2021.  5.

제235회 익산시의회(1차 정례회)

2021행정사무감사자료

	건 설 국

건  설  과

□			감사자료 과 공통사항
			1.	2020년도 업무성과 및 반성	181
			2.	2020년도 예산집행 및 추진사항	182
			3.	2020년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	187
			4.	2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과	191
			5.	5분 자유발언 조치 결과	192
			6.	시정질문에 대한 조치 결과	193
			7.	의원발의 조례 제ㆍ개정 후 추진현황	199
			8.	주요사업 조서 (3천만원 이상)	200
			9.	2020년도 각종 민원(진정·건의·청원 등) 접수 처리내역	204
			10.	기금 운용 관련	204
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	205
			12.	용역사업 관련	206
			13.	인․허가 민원관련	211
			14.	각종 공사 설계변경 상황	211
			15.	건설공사 집행 현황 (3천만원이상)	213
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	213
			17.	국.도비 보조사업 집행현황 (1억원이상)	214
			18.	2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역	215
			19.	2020년 예산 중 2021년 명시 및 사고이월 내역	217
			20.	예산 이용, 전용 사항 및 예비비 집행 현황	219
			21.	공사 준공기한 연장 내역	219
			22.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	219
			23.	국․도비 반납 현황 및 사유 (2020년도 반납건)	220
			24.	2020년도 계획사업중 미착공사업 현황	221
			25.	2020년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	221
			26.	2020년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업	221
			27.	2020년도 예산편성후 전액 미집행 내역	222
			28.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황	222
			29.	소송 사건 현황	223
			30.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황	224
			31.	시설‧사무 민간위탁 현황	225
			32.	의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과	225
			33.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황	225
			34.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황	226
			35.	시 산하 재단 설립 현황	226
			36.	업무협약(MOU) 등 체결 현황	226

□			감사자료 과 요구사항
			1.	2020년도시군도및농촌도로 확·포장사업		229
				-진행중인 시군도 및 농촌도로 현황 (이월및계속사업)		229
				-2020년도 신규사업 현황		231
				-2020년도 준공된 사업현황		231
				- 2020년도 예산 미확보사업 (이월 및 계속사업)		231
			2.	군도23호선 도로확·포장사업		232
			3.	평화육교 재가설사업		233
			4.	왕궁천 하천 정비사업		234
			5.	동명천 하천 정비사업		235
			6.	소하천 정비사업(동산천)		236
			7.	만경강 문화관 조성사업		237
			8.	국가하천 유지관리사업		238
			9.	하천제방유지보수		239
			10.	도로조명 조도개선		240
			11.	도로조명 고장민원 처리내역		241

감사자료 과 공통사항

1. 2020년도 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

□ 성    과

◦ 평화육교 재가설로 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망구축

▸ 미매입토지 재감정평가 및 보상협의	: 2020.  1. ~ 12.

▸ 평화육교 재가설공사 추진	: 2020.  1. ~ 12.

※ 공사 공정율 – 80%(2020. 12월말 기준)

◦ 농어촌도로 확포장 및 도로구조개선으로 차량통행 불편해소 및 농촌지역
경제활성화 기반시설 구축 (6개사업 준공)

▸농어촌도로 도로구조개선사업 완료 : 5개소

- 망성 신성~관산간 도로확포장

· 도로확포장 L=0.91㎞, B=7.0m, 준공 및 개통	: 2020.  8. 23.

- 용안 창리 ~ 법성간간 도로확포장

· 도로확포장 L=0.84㎞, B=6.0m, 준공 및 개통	: 2020.  6. 22.

- 함라 칠성~다은간 도로확포장

· 도로확포장 L=1.0㎞, B=8.0m, 준공 및 개통	: 2020.  5. 18.

- 망성 군도10호~금지간 도로확포장

· 도로확포장 L=1.2㎞, B=8.0m, 준공 및 개통	: 2020.  9. 10.

- 오산 제일교회~정각사간 도로확포장

· 도로확포장 L=0.4㎞, B=8.0m, 준공 및 개통	: 2020.  8. 26.

▸주요사거리 회전교차로 설치 : 1개소

- 용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업

· 회전교차로 1식, 회전교차로 설치 준공 및 개통	: 2020.  6. 29.

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 환경 친화적 하천 정비로 재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸왕궁천 하천환경정비사업 1지구 1, 2차분 공사 완료        : 2019. 12./ 2020.  8. (공정률 40%)

▸동산천 소하천정비사업 공사 추진	: 2019. 12. 12. 착공(공정률 80%)

□ 반     성

◦ 기록적인 집중호우로 인한 왕궁천 하류 농경지 침수 발생(2020.6.14. 141㎜/5h)

▸조속한 왕궁천 하천정비공사 완공으로 자연재해 예방 등 주민 불편 해소

2. 2020년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		이용재	□
작성자	:	도로시설계장		임대성	□

【2020.12.31.현재】                                                               (단위 : 천원.%)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액					지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D))	비율 (B/A)	비고
				계(A)	2020 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액	계속비 이월액
건설과				46,062,076	21,548,835	11,036,505	3,791,962	9,684,774	22,463,322	22,006,173	7,116	1,585,464	48.8
	도로시설관리			20,245,530	7,049,950	9,403,618	3,791,962	0	11,107,765	7,744,378	4,681	1,388,705	54.9
		시군농어촌 도로확포장		14,366,585	1,930,000	9,323,618	3,112,967	0	6,569,685	6,532,390	0	1,264,509	45.7
			금마갈산~서편간 도로확포장공사	656,165	200,000	456,165	0	0	292,331	363,834	0	0	44.6	(참고1) 명시 200,000 사고 163,834
			오산장신~만석간 도로확포장공사	3,978	0	3,978	0	0	1,400	0	0	2,578	35.2	(참고2)
			왕궁온수~시대간(황암~상발) 도로확포장공사	284,394	0	0	284,394	0	74,785	0	0	209,609	26.3	(참고3)
			왕궁군도26호선(리도210호) 도로확포장공사	213,632	0	213,632	0	0	19,770	53,948	0	139,914	9.3	사고 (참고4)
			미물용지매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	100,000	0	0	0	96,759	0	0	3,241	96.8
			망성 신성~관산간 도로확포장공사	467,076	50,000	327,000	90,076	0	343,894	0	0	123,181	73.6
			춘포토다리~덕동간 도로확포장공사	701,262	0	450,000	251,262	0	325,212	376,050	0		46.4	사고 (참고5)
			용안~창리법성간 도로확포장공사	846,918	230,000	477,658	139,260	0	795,062	0	0	51,855	93.9
			함라칠성~다은간 도로확포장공사	198,842	0	164,729	34,113	0	101,487	0	0	97,355	51.0	(참고6)
			망성군도10호금지간 도로확포장공사	409,622	50,000	339,345	20,276	0	388,586	0	0	21,035	94.9
			금마 누동~신촌간 도로확포장공사	319,409	0	180,000	139,409	0	21,041	180,000	0	118,369	6.6	사고 (참고7)
			군도23호선 도로확포장공사	4,802,888	0	2,906,219	1,896,669	0	2,310,819	2,160,153	0	331,916	48.1	사고 (참고8)
			시군도 도로 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	117,920	0	117,920	0	0	0	98,201	0	19,719	0	사고 (참고9)
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	371,131	300,000	65,756	5,375	0	312,639	58,472	0	20	84.2	명시
			오산면 소재지 진입도로 (군도2호) 확포장공사	1,025,670	500,000	500,000	25,670	0	1,481	1,000,000	0	24,189	0.1	(참고10) 명시 500,000 사고 500,000
			오산제일교회~정각사간 도로확포장공사	569,772	170,000	339,965	59,807	0	549,013	0	0	20,759	96.4
			황동도선~외화간도로확포장공사	334,200	0	300,000	34,200	0	66,008	268,192	0	0	19.8	사고 (참고11)
			오산역~상아마을간병목구간 도로확포장공사	182,160	0	182,160	0	0	27,736	154,424	0	0	15.2	사고 (참고12)
			하나로~소간촌간 도로확포장공사	567,009	0	499,980	67,029	0	40,720	497,670	0	28,619	7.2	사고 (참고13)
			왕궁양동마을진입 도로확포장공사	432,956	80,000	323,107	29,849	0	331,994	100,963	0	0	76.7	명시 17,191 사고 83,771
			춘포창평마을진입 도로확포장공사	100,000	0	100,000	0	0	0	30,077	0	69,923	0	사고 (참고14)
			왕궁금오동~군도22호간 도로확포장공사	259,598	0	259,598	0	0	15,041	244,556	0	0	5.8	사고 (참고15)
			금마신정~증왕간 도로확포장공사	535,577	0	500,000	35,577	0	337,379	198,198	0	0	63.0	사고 (참고16)
			춘포오룡선 도로확포장공사	110,808	0	110,808	0	0	103,156	7,652	0	0	93.1	사고
			황등면하동마을~ 동연지하차도우회 도로개설공사	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	사고 (참고17)
			춘포노적선 도로확포장공사	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	명시 (참고18)
			시군농어촌도로 확포장사업추진	15,598	10,000	5,598	0		13,370	0	0	2,228	85.7
			시도31호 도로확포장사업	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	명시 (참고19)
			백제왕도탐방로조성 (익산토성)	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	명시 (참고20)
		지방도 도로확포장		1,500,000	1,500,000	0	0	0	874,924	625,076	0	0	58.3	(참고21)
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,500,000	1,500,000	0	0	0	874,924	625,076	0	0	58.3	명시 (참고21)
		철도건널목 개량사업		305,122	0	0	305,122	0	278,449	0		26,673	91.3
			평화육교재가설	305,122	0	0	305,122	0	278,449	0	0	0	91.3
		주민숙원사업		34,600	34,600	0	0	0	34,594	0		6	100.0
			주민숙원사업	34,600	34,600	0	0	0	34,594	0	0	6	100.0
		교통관리 개선사업		1,239,873	786,000	80,000	373,873	0	635,080	586,912	0	17,880	51.2
			용안난포삼거리 위험도로 구조개선	373,873	0	0	373,873	0	355,993	0	0	17,880	95.2
			왕궁신호~용남 위험도로 구조개선	486,000	406,000	80,000	0	0	84,333	401,666	0	0	17.4	명시 (참고22)
			낭산~시영 선형개량사업	100,000	100,000	0	0	0	23,683	76,317	0	0	23.7	명시 (참고23)
			신왕교차로 회전교차로 설치사업	280,000	280,000	0	0	0	171,071	108,929	0	0	61.1	명시 (참고24)
		도로조명시설관리		2,799,350	2,799,350	0	0	0	2,715,033	0	4,681	79,636	97.0
			보안등신규설치	228,000	228,000	0	0	0	226,332	0	0	1,668	99.3
			노후가로등정비	834,700	834,700	0	0	0	825,948	0	0	8,752	99.0
			가로등·보안등 유지관리	1,644,610	1,644,610	0	0	0	1,578,532	0	0	66,078	96.0
			가로등 보수차량 운영 유지비	16,040	16,040	0	0	0	14,072	0	0	1,968	87.7
			보안등신규설치 (보조)	76,000	76,000	0	0	0	70,148	0	4,681	1,171	92.3
	하 천 정 비			25,739,944	14,422,283	1,632,887	0	9,684,774	11,279,190	14,261,795	2,435	196,524	43.8
		하천정비 및 유지관리		25,739,944	14,422,283	1,632,887	0	9,684,774	11,279,190	14,261,795	2,435	196,524	43.8
			지방하천정비 (왕궁천) 전환사업	17,138,813	8,510,000	0	0	8,628,813	6,328,117	10,810,696	0	0	36.9	계속 (참고25)
			지방하천정비 (동면천) 전환사업	2,685,961	1,630,000	0	0	1,055,961	90,328	2,595,632	0	0	3.4	계속 (참고26)
			소하천정비 (동산천) 전환사업	1,834,798	1,597,000	237,798	0	0	1,464,188	370,610	0	0	79.8	명시
			소하천정비 (닭작골천) 전환사업	269,413	0	269,413	0	0	81,892	0	0	187,521	30.4	계속 (참고27)
			하천제방 유지보수(자체)	2,263,309	1,279,783	983,526	0	0	1,817,695	436,612	0	9,003	80.3	명시
			하천제방유지보수	300,150	208,000	92,150	0	0	300,150	0	0	0	100.0
			국가하천유지보수(4대강)	355,000	355,000	0	0	0	353,845	0	1,155	0	99.7
			국가하천유지관리 (4대강외)	198,000	198,000	0	0	0	196,720	0	11,280	0	99.4
			만경강 물문화관진입도로 개설공사	694,500	644,500	50,000	0	0	646,255	48,245	0	0	93.1	명시
	재무활동 (보전지출)			5,560	5,560	0	0	0	5,358	0	0	202	96.4
			보전지출	5,300	5,300	0	0	0	5,115	0	0	185	96.5
			시조비보조금 반환금	260	260	0	0	0	243	0	0	17	93.5
	행정운영경비 (건설과)			71,042	71,042	0	0	0	71,009	0	0	33	100.0
			국가하천유지보수 (인력운영비)	40,000	40,000	0	0	0	40,000	0	00	0	100.0
			기본경비	31,042	31,042	0	0	0	31,009	0	00	33	99.9

(참 고) 2020년 예산집행 부진 사유

(단위 : 천원,%)

연번	세부사업명	예 산 액	지 출 액	비 율	부 진 사 유
1	금마갈산~서편간 도로확포장공사	656,165	292,331	44.6	‧토지 협의보상 추진중
2	오산장신~만석간 도로확포장공사	3,978	1,400	35.2	‧공사 준공 후 잔액
3	왕궁온수~시대간(황암~상발) 도로확포장공사	284,394	74,785	26.3	‧토지 협의보상 추진중
4	왕궁군도26호선(리도210호) 도로확포장공사	213,632	19,770	9.3	‧공사 구간 내 불부합지로 인한 설계 지연
5	춘포토다리~덕동간 도로확포장공사	701,262	325,212	46.4	‧공사 준공시기 미도래로 집행 불가
6	함라칠성~다은간 도로확포장공사	198,842	101,487	51.0	‧공사 준공 후 잔액
7	금마 누동~신촌간 도로확포장공사	319,409	21,041	6.6	‧토지수용위원회 개최 지연으로 집행불가
8	군도23호선 도로확포장공사	4,802,888	2,310,819	48.1	‧공사 준공시기 미도래로 집행 불가
9	시군도 도로 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	117,920	0	0	‧행정절차(재해영향평가, 환경영향평가) 이행
10	오산면 소재지 진입도로 (군도2호) 확포장공사	1,025,670	1,481	0.1	‧토지 협의보상 추진중

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부진사유
11	황동도선~외화간도로확포장공사	334,200	66,008	19.8	‧공사 준공시기 미도래로 집행 불가
12	오산역~상아마을간병목구간 도로확포장공사	182,160	27,736	15.2	‧토지수용절차 진행중
13	하나로~소간촌간 도로확포장공사	567,009	40,720	7.2	‧토지 협의보상 추진중
14	춘포창평마을진입 도로확포장공사	100,000	0	0	‧용역 준공시기 미도래로 집행 불가
15	왕궁금오동~군도22호간 도로확포장공사	259,598	15,041	5.8	‧토지 협의보상 추진중
16	금마신정~증왕간 도로확포장공사	535,577	337,379	63.0	‧토지 협의보상 추진중
17	황등면하동마을~ 동연지하차도우회 도로개설공사	500,000	0	0	‧주민간 노선합의 불가로 설계 지연
18	춘포노적선 도로확포장공사	100,000	0	0	‧행정절차(소규모재해영향평가) 이행
19	시도31호 도로확포장사업	70,000	0	0	‧공사 준공시기 미도래로 집행 불가
20	백제왕도탐방로조성 (익산토성)	70,000	0	0	‧행정절차(재해영향평가, 환경영향평가) 이행
21	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,500,000	874,924	58.3	‧토지 협의보상 추진중
22	왕궁신호~용남 위험도로 구조개선	486,000	84,333	17.4	‧행정절차(소규모재해영향평가) 이행
23	낭산~시영 선형개량사업	100,000	23,683	23.7	‧행정절차(전용협의) 이행
24	신왕교차로 회전교차로 설치사업	280,000	171,071	61.1	‧공사 준공시기 미도래로 집행 불가
25	지방하천정비 (왕궁천) 전환사업	17,138,813	6,328,117	36.9	‧하천공사 특성상 집중호우 등 우천으로 인한 하절기 공사 지연 (장기계속공사 차수분 공사 계약 : 원인행위액 15,009,914)
26	지방하천정비 (동면천) 전환사업	2,685,961	90,328	3.4	‧동면천 하천기본계획 변경에 따른 실시설계조정 및 지방하천사업 지방이양에 따른 관리기관 변경 (국토부→전라북도)으로 협의 지연
27	소하천정비 (닭작골천) 전환사업	269,413	81,892	30.4	‧21년도 풍수해 생활권 종합정비사업 선정에 따른 사업부서 이관(건설과→시민안전과)

3. 2020년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

연번	시정․개선사항	조치(처리) 결과	비고
1	▸예산집행 실적이 저조하며 이월예산이 많은바, 예산편성 및 운용시 유의하여주시기 바람 ▸토지매입의 경우 토지주를 직접찾아가는등 적극행정을 통하여 예산집행 실적이 향상될수있도록 노력하기 바람	▸공사추진에 따른 실시설계 등 행정절차 이행으로 예산집행이 지연, 최대한 예산이 조기에 집행될 수 있도록 적극 노력하겠음 ▸토지주를 직접 만나 설득 하고 보상업무가 향상되도록 노력하고 있음 앞으로도 더욱 적극적으로 토지매입이 향상 될 수 있도록 노력하겠음
2	▸공사추진시 설계변경이 많이 발생되고 있는바, 추후 현장확인 등을 철저히 하여 설계변경이 최소화 되도록 노력하기 바람	▸설계변경이 최소화 되도록 실시설계시 현장확인 및 지역주민들의 의견을 청취하여 반영하도록 하겠음
3	▸어양동 어곳~부평간 도로확포장사업 추진이 예산부족등으로 지연되고 있어 조속한 시일내에 완료될 수 있도록 노력하기 바람	▸추경에 토지보상비를 확보하여 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 노력하겠음
4	▸사업이 지연되어 매년 이월예산이 반복되어 발생되고 있는바. 이월이 최소화 될수 있도록 노력하기바람	▸사업을 추진하는 데는 많은 행정 절차(설계, 토지매입, 공사 등)가 필요하고, 행정절차 진행정도에 따라 예산확보 추진해야 하는데 예산확보 후 사업추진으로 이월예산 발생, 앞으로 행정절차 진행 정도에 따라 예산확보 후 사업추진 하겠음
5	▸많은 농어촌도로를 지정해 놓고 사업 추진이 부진한데, 현재까지 완료된 농어촌도로의 포장율에 대하여 설명하기 바람	▸우리시 농어촌도로노선 275개소 723km중 312km 완료, 포장율 43%이며 10여년전 국비중단으로 사업이 지연되고 있음 ▸노선 지정된 275개소는 20여년전 계획으로 현지여건 변화 등으로 맞지 않는 부분이 있어 현재 도로정비계획 용역을 진행중에 있으며, 용역이 완료되면 정비계획에 따라 사업을 시행하여 주민 불편을 해소하겠음
6	▸안전진단 결과 D급 판정으로 재가설 중인 평화육교 재가설 사업 준공이 당초 2020년 6월 에서 2021년 9월로 늦어진 사유에 대하여 설명하기 바람 ▸평화육교 준공이 1년2개월 지연 됨에 따른 지역주민 피해 (영업)가 막대하게 발생되고 있는바, 보상방안을 강구하기 바람	▸2017년 7월 기존 평화육교를 철거하고 사업착수 하려 하였 으나, 지역주민의 민원으로 사업착수가 2018년 7월로 1년 늦어짐에 따라 그만큼 준공이 늦어지게 되었으며, 이를 지역주민에게 홍보하지 못한 불찰이 있었음 ▸직접적인 영업보상은 관련 법령이나 규정사례 등이 없어 어려움
7	▸소하천관리위원회 운영실적이 없어 설치 목적이 없다면 위원회 폐지를 검토하기 바람	▸소하천법 제26조’에 의하면 소하천기본계획수립 및 변경, 소하천 구역 폐지 등 소하천 유지□관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 소하천관리위원회를 의무적으로설치하게 되어있으며 ▸소하천정비공사 등 일반적인 사항은 사전 설계 검토(전북도)를 거쳐 시행하고 있음
8	▸왕궁천이 공사가 진행중에 있어 하류지역인 익산천 정비공사가 신속히 진행될 수 있도록 협조 요망	▸현재 익산지방국토관리청에서 만경강 하류권역 하천기본계획에 익산천 기본계획이 포함되어 용역중에 있으므로 용역이 완료되면 도청에 신규사업 예산 건의 예정
9	▸황등호 주변 상습 침수지역이 발생될수 있으므로 탑천기본 계획에 반영 ▸농어촌공사와 미래농정국간 업무협조	▸탑천은 현재 익산지방국토관리청에서 만경강 하류권역 하천기본계획에 탑천 기본 계획이 포함되어 용역 중에 있으며, 황등호 주변 상습 침수피해는 현재 농어촌공사에서 황등 배수개선사업을 시행 중임
10	▸만경강 문화관 공사 준공도 중요하지만, 준공 후 운영관리가 더 중요하다고 생각하는바, 익산시가 운영관리에 주도적으로 참여하여 추진될 수 있도록 노력하기 바람	▸만경강 문화관 건립 협약 시 준공 후 운영 관리는 익산시가 맡기로 업무협약 체결된바, 만경강 유역 협의체에서 실시하고 있는 용역(운영관리 포함)에 대하여 우리시가 주도적으로 참여하여 운영관리가 원활히 이루어 질 수 있도록 추진하겠음

4. 2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고
1	▸하천 및 소하천점용허가 36건	▸하천(소하천)점용 사용허가· 고시 및 공고 미이행	▸하천점용허가 30건에 대하여 관보 또는 공보에 고시하지 않았고, 소하천점용허가 6건에 대하여 공보 또는 게시판에 공보하지 않은 사항에 대하여 공보에 고시예정	익산시 자체감사
2	▸만경강 제방 풀깍기 공사 등 6건	▸통합발주 가능 공사 분할 수의 계약 부적정	▸사업내용 등을 면밀히 검토하여 1인 견적수의 계약 체결을 위하여 공사량을 의도적으로 분할 하지 않도록 하고 유사 하거나 중복되는 사업은 통합 발주 추진	감사원 대행감사
3	▸군도23호선 도로확포장 공사	▸군도23호선 도로 확포장공사 추진 부적정	▸군도23호선 도로확포장공사 추진 부적정에 따른 과다 지급분 25,669천원 회수 조치, 과다 계상된 공사비 138,116천원 감액 조치	전라북도

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	건설과장		이용재	□
작성자	:	도로시설계장		임대성	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

발언 의원 / 발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
김용균 223회	▸평화육교 재가설사업 지연에 따른 인근지역 주민들의 막대한 피해가 예상되는바, 해결방안과 공사기간 단축방안을 마련하기 바람	▸대체우회도로 개통(2→4차선) 및 대 간선 수로(갈수기만 시공가능, 11~4월) 중첩 부분 시공에 따른 공기 연장 불가 피함을 지역 주민들에게 지속적으로 설명 2021년 6월 개통을 목표로 사업을 추진 중에 있음
김충영 228회	▸만경강 조성시 자전거와 접목된 컨텐츠 반영으로 익산시가 자전거의 메카로 발돋움 할 수 있도록 노력하기 바람	▸만경강문화관 건립사업 추진중으로 자전거와 접목된 컨텐츠(안)에대하여 익산지방국토관리청(만경강유역협의회) 협의 또는 익산시 유지관리시 반영계획 ※자전거 보관소 및 인증센터 설치 건의
조남석 232회	▸익산 도심지역의 원활한 교통소통을 목적으로 추진되고 있는 서수-평장간 국도대체우회도로가 주민 동의도 없이 노선이 변경됨에 따라 대책 수립을 촉구하기 위해서	▸2007년도에 수립된 익산시도시기본 계획 및 국토의계획 및 이용에관한법률에 의거 노선을 결정한 사항으로서 황등지역 주민이 요구하는 노선조정 사항에 대하여 관계기관 협의 진행 중임

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

【관리번호 : 226 - 1 - 1 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
		설명일자	2020.06.11.
제 목	평화육교재가설 사업의 사업기간 연장에 따른 문제점에 대하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦평화육교 재가설 사업의 사업기간 연장으로 인한 평화동, 목천동 상인들의 생존권 확보를 위한 대책 마련이 시급하다 할 것인데 이에 대한 시장님의 대책은?
▣ 답 변 내 용 ◦현행법상 평화육교 준공기한 연장으로 해당 주민에게 직접적인 보상은 어려운 실정이나, ◦조금이나마 주민의 불편을 해소하기 위해 현재 사업시행자인 한국철도시설 공단 등과 공기 단축을 위해 노력했지만 기존 평화육교 철거 지연으로 당초 준공일보다 11개월 늦어진 2021년 6월 준공을예정으로 공사에 박차를 가하고 있으며, ◦더이상 사업이 지연되어 지역 소상공인이 피해를 보지 않도록 최선의 노력을 다하겠음 ▣ 금 후 계 획 ◦평화육교 재가설 공사 추진 : 2020. 6. ~ 2021. 6.

【관리번호 : 226 - 1 - 3 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
		설명일자	2020.06.11
제 목	목천동주민들의 숙원사업에 대하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦번영로 8길과 국도26호선(전군간도로)이 직접 연결되어 평화육교 재가설 대체우회도로를 이용하는 많은 시민들이 요구하는 진정민 원이 해소되어야 된다고 생각하는데 이에대한 대책은?
▣ 답 변 내 용 ◦번영로8길~만경강까지 연결하여 자전거 도로로의 활용이 필요하다고 생각하나, ◦번영로8길과 위임국도 26호를 직접 연결할 경우 신호등 및 대기차선 신설 등 도로 구조변경이 우선되어야 하며, ◦이를 위해서 도로 관리청인 전북도 및 교통시설을 주관하는 익산경찰서 등과 심도 있는 협의를 하겠음 ▣ 금 후 계 획 ◦향후 전북도 및 익산경찰서 등과 심도 있는 협의를 통하여 추진될 수 있도록 노력하겠음

【관리번호 : 226 - 1 - 4 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
		설명일자	2020.06.22
제 목	목천동주민들의 숙원사업에 대하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 만경강 물문학관 조성사업이 2017년에 시작했음에도 불구하고 토지매입 지연으로 올해 완료되지 못하고 사업이 내년까지 연장된다고 하는데 이에대한 대책은?
▣ 답 변 내 용 ◦ 만경강 문화관 조성사업은 2017.4.7. 익산시, 김제시, 익산지방국토관리청의 업무협약을 통하여 익산시는 토지보상 및 사업완료 후 관리·운영을, 익산지방국토관리청에서 사업시행을 맡았습니다. ◦ 사업 시행 전 행정절차[도시관리계획결정(변경)]로 인하여 사업이 지연되었으나, 18. 12~20. 3월에 걸쳐 토지수용 및 소유권 이전을 완료 하였습니다. ◦ 익산지방국토관리청은 19. 10월 사업사 선정을 거쳐 19.12~21.6월까지 공사 추진 예정입니다. ◦ 내실있는 조성사업이 추진되도록 익산지방국토관리청에 협조 요청하겠습니다. ▣ 금 후 계 획 ◦ 건축 및 토목 등 공사추진(익산지방국토관리청) : 2019. 12. ~ 2021. 12. ◦ 건축물 내 콘텐츠관련 발주(익산지방국토관리청) : 2020. 7 . ~ 2021. 12. ◦ 만경강문화관 관리·운영(익산시) : 2022. 1. ~

【관리번호 : 226 - 1 - 5 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	김용균	답 변	시장
		설명일자	2020.06.22
제 목	목천동주민들의 숙원사업에 대하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 만경강 고수부지를 활용하여 익산을 홍보할 수 있도록 국화꽃단지를 조성하고, 물문학관, 만경강제방 자전거도로, 파크골프장, 시민체육공원, 축구장, 족구장, 야구장을 조성하여 익산의 홍보와 관광명소 조성을 건의하는바 이에 대한 의견은?
▣ 답 변 내 용 ◦ 국가하천 만경강은 익산지방국토관리청에서 6개 지구의 하천환경정비사업으로 나누어 자전거도로, 체육시설 및 산책로 등을 조성하고 있습니다. ◦ 2018년까지 신지·목천·춘포·화전지구 공사를 완료하였으며, 반월지구, 마산지구는 2020년에 완료 예정입니다. ◦ 사업시행청인 익산지방국토관리청에서 사업추진 시 하천에 적합한 초화류 등을 검토하여 산책로 등에 반영하였으며, 반월지구 등에 충분한 체육시설을 반영하여 사업추진하고 있습니다. ◦ 국가하천 부지 내 추가적인 행위를 위해서는 익산지방관리청의 하천점용를 받아, 시비 100%로 추진하여야 하며 국화 꽃단지 등의 개발은 하천용도지구에 따른 가능시설 여부등에 대하여 익산지방국토관리청과 협의 등 충분한 검토 후 추진해야 할 것으로 판단됩니다. ▣ 금 후 계 획 ◦ 만경강 하천환경정비사업(문화관, 체육시설-익산청) 추진 : ~ 2021. 12 ◦ 국화꽃단지, 주차장 조성에 대한 타당성 검토 등 : 2021. 6 ~

【관리번호 : 226 - 2 - 1 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	최종오	답 변	시장
		설명일자	2020.06.11
제 목	오산면에 위치한 농어촌도로 개설 공사의 문제점에 대하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦건설과에서 추진하고 있는 오산역~상아마을간 병목구간 도로확포장공사 오산 제일교회~정각사간 도로확포장공사는 총사업비 예산이 세워졌음에도 불구하고 토지매입 지연등으로 공사추진에 어려움을 겪고 있는바, 이에 대한 대책은 무엇인지에 대하여?
▣ 답 변 내 용 ◦ 오산역~상아마을간 도로확포장 공사 부지내 3필지의 토지소유주와 지속적인 접촉을 진행중에 있으나, ◦ 토지소유주의 지속적이고 이유없는 반대로 인해 토지수용이 불가피한 실정이나 소유주의 연령을 감안하여 협의 매수에 최선을 다하면서 수용절차 진행하겠음 ▣ 금 후 계 획 ◦ 보상협의 요청(2회) : 2020. 6. 19. ~ 2020. 7. 24. ◦ 보상협의 요청(3회) : 2020. 7. 27. ~ 2020. 8. 31. ◦ 수용 관련 행정절차 : 2020. 9. ~ 2020. 12.

【관리번호 : 226 - 6 - 2 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	한동연	답 변	시장
		설명일자	2020.06.11
제 목	건설국 사업에 대하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( √ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 건설국에서 추진하는 신규사업 건수가 행정사무감사 자료에서 상이한 것에 대한 이유
▣ 답 변 내 용 ◦ 행정사무감사 자료작성을 건설국 각 과별로 작성하다보니 상이하게 된 것으로 보이며, 금후 자료 제출 시에는 질문요지에 대하여 동일한 기준으로 작성하여 취합하겠음 ▣ 금 후 계 획 ◦ 향후 자료 제출시 모든 과가 질문요지에 대하여 동일한 기준으로 작성하고 취합하여 한눈에 볼 수 있게 제출하겠음

【관리번호 : 226 - 6 - 3 】

일 시	2020. 6. 10. (제226회 제1차정례회)	질문의원	한동연	답 변	시장
		설명일자	2020.06.11.
제 목	어양동 어곳~부평간 도로 확 ·포장 공사와 관련하여			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( √ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦당초 사업계획대로 추진하지 못한 이유 및 마무리 시기
▣ 답 변 내 용 ◦우선 어곳~부평간 도로확포장공사는 2018년 실시설계를 시작으로 현재 공사 추진을 위한 토지매입중으로 매입율은 60%이며, ◦추경에 보상비를 확보하여 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 노력하겠으며, 또한 2021년 사업 마무리할 수 있도록 노력하겠음. ▣ 금 후 계 획 ◦ 보상 협의 : 2020. 6. ~ 12. ◦ 공사 발주 : 2021. 1. ◦ 준공 : 2021. 12.

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	건설과장		이용재	□
작성자	:	도로시설계장		임대성	□

해 당 사 항 없 음

8. 주요사업 조서 (3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

								(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요			예산액		집행액		잔액	집행률	비고
	계	52건			39,309,944		19,190,134		20,119,810	48.8
1	평화육교 재가설	.사업기간:15.11~21.9 .총사업비:49,700,000 .사업량:L=233㎞ B=35m			305,122		278,449		26,673	91.3
2	군도23호선 도로확포장	.사업긴간:16.1~21.6 .총사업비:12,500,000 .사업량: L=3.4㎞ B=16.5-20.5m			4,802,888		2,310,819		2,492,069	48.1
3	망성 신성~관산간 도로확.포장	.사업기간:17.1~20.8 .총사업비:942,000 .사업량:L=0.91km B=7.0m			467,076		343,894		123,182	73.6
4	용안 창리~법성간 도로확.포장	.사업기간:17.1~20.6 .총사업비:1,448,000 .사업량:L=0.84km B=8.0m			846,918		795,062		51,856	93.9
5	오산장신~만석간 도로확.포장	농경지 연결도로 포장 33개소			3,978		1,400		2,578	35.2
6	함라 칠성~다은간 도로확.포장	.사업기간:17.1~20.5 .총사업비:926,000 .사업량:L=1.0km B=8.0m			198,843		101,487		97,356	51.0
7	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	.사업기간:17.1~20.9 .사업량:L=1.2km B=8.0m			409,622		388,586		21,036	94.9
8	금마 누동~신촌간 도로확.포장	.사업기간:18.1~21.12 .총사업비:980,000 .사업량:L=1.01km B=8.0m			319,409		21,040		298,369	6.6
9	금마 갈산~서편간 도로확포장	.사업기간:19.1~22.12 .총사업비:2,829,000 .사업량:L=1.6km B=8.0m			656,165		292,331		363,834	44.6
10	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	.사업기간:19.1~22.12 .총사업비:2,803,000 .사업량:L=1.7km B=8.0m			284,394		74,785		209,609	26.3
11	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	.사업기간:18.1~21.12 .총사업비:1,920,000 .사업량:L=1.0km B=8.0m			701,262		325,212		376,050	46.4
12	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	.사업기간:18.1~22.12 .총사업비:3,100,000 .사업량:L=0.8km B=8.0m			371,131		312,639		58,492	84.2
13	금마 신정~중왕간 도로확.포장	.사업기간:18.1~22.12 .총사업비:1,500,000 .사업량:L=1.2km B=8.0m			535,577		337,379		198,198	63.0
14	황등 도선~외화간 도로확.포장	.사업기간:18.1~21.12 .총사업비:1,000,000 .사업량:L=0.7km B=8.0m			334,200		66,008		268,192	19.8
15	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	.사업기간:18.1~20.8 .총사업비:870,000 .사업량:L=0.4km B=8.0m			569,772		549,013		20,759	96.4
16	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	.사업기간:18.1~21.12 .총사업비:1,290,000 .사업량:L=0.6km B=8.0m			432,956		331,994		100,962	76.7	3회추경
17	하나로~소간촌간 도로확.포장	.사업기간:18.1~22.12 .총사업비:1,600,000 .사업량:L=1.0km B=8.0m			567,009		40,720		526,289	7.2
18	오산면소재지 진입 도로확.포장	.사업기간:18.1~22.12 .총사업비:5,000,000 .사업량:L=0.95km B=23.0m			1,025,670		1,481		1,024,189	0.1
19	오산역~상아마을간 도로확포장	.사업기간:18.1~22.12 .총사업비:300,000 .사업량:L=0.2km B=7.0~8.0m			182,160		27,736		154,424	15.2
20	춘포 창평마을 진입도로 확포장	.사업기간:18.1~22.12 .총사업비:1,500,000 .사업량:L=0.7km B=8.0m			100,000		0		100,000	0.0
21	왕궁 군도26호선 도로확포장	.사업기간:19.1~22.12 .총사업비:2,970,000 .사업량:L=1.7km B=8.0m			213,632		19,770		193,862	9.3
22	왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장	.사업기간:19.1~22.12 .총사업비:1,000,000 .사업량:L=0.55km B=8.0m			259,598		15,041		244,557	5.8
23	춘포 오룡선 도로확포장	.사업기간:19.1~22.12 .총사업비:1,000,000 .사업량:L=0.5km B=8.0m			110,808		103,156		7,652	93.1
24	황등 하동마을~동연지하차도간 도로개설	.사업기간:19.1~22.12 .총사업비:1,250,000 .사업량:L=0.7km B=8.0m			500,000		0		500,000	0.0
25	춘포 노적선 도로확포장	.사업기간:20.1~22.12 .총사업비:700,000 .사업량:L=0.4km B=8.0m			100,000		0		100,000	0.0
26	백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	.사업기간:21.1~21.12 .총사업비:1,355,000 .사업량:L=1.74km B=5.0m			70,000		0		70,000	0.0	3회추경
27	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	위험도로 구조개선 1식			373,874		355,993		17,881	95.2
28	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	.사업개요:선형개량 .총사업비:486,000 .사업량:L=0.5km B=8.0m			486,000		80,000		406,000	16.5
29	낭산~시영 선형개량사업	.사업개요:선형개량 .총사업비:1,000,000 .사업량:L=0.4km B=8.0m			100,000		23,683		76,317	23.7
30	신왕교차로 회전교차로 설치	회전교차로 설치 1식			280,000		171,071		108,929	61.1
31	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획용역	정비계획 1식			117,920		0		117,920	0.0
32	시도31호 도로확포장 사업	타당성조사 1식			70,000		0		70,000	0.0	3회추경
33	하나로 ~ 4산단간 지방도 도로확포장	보상비			1,500,000		874,924		625,076	58.3
34	소하천정비 (동산천)	.사업기간:2018.~2021. .총사업비:3,210,000 .사업량:L=1.02㎞			1,834,798		1,464,188		370,610	79.8	원인행위 1,786,666 장기계속
35	지방하천정비 (왕궁천)	.사업기간:2015.~2022. .총사업비:47,368,000 .사업량:L=9.25㎞			15,950,503		5,744,669		10,205,834	36.0	원인행위 13,845,558 계속비
36	하천제방유지보수(자체)	관내 소하천(102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식			2,263,309		1,817,695		445,614	80.3	명시이월
37	하천제방유지보수	관내 지방하천(187km) 유지보수 1식			300,150		300,150		0	100.0
38	국가하천유지관리 (4대강)	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식			355,000		353,845		1,155	99.7
39	국가하천유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식			198,000		196,720		1,280	99.4
40	보안등교체 및 설치공사	익산시관내 - 377개소			226,000		224,331		1,669	99.3
41	도심지역 가로등 유지보수단가	도심지역노후 가로등보수1식			120,000		120,000		0	100.0
42	산업단지 가로등 유지보수	산업단지 노후가로등정비1식			60,000		51,759		8,241	86.3
43	읍면지역보안등보수	고장보안등보수			120,000		120,000		0	100.0
44	동지역 보안등 보수단가	고장보안등보수			78,200		75,888		2,312	97.0
45	전기안전점검 부적합보수	부적합 가로등보수			30,000		24,652		5,348	82.2
46	노후보안등기구교체	노후등기구보수			42,000		41,998		2	100.0
47	도심지역 노후 가로등 교체공사	노후가로등철주 및 등기구 교체 - 1식			100,000		99,914		86	99.9
48	노후가로등LED 교체공사	LED등기구 교체 - 1식			100,000		93,016		6,984	93.0
49	산업단지 조도개선 공사	가로등 정비1식			90,000		85,597		4,403	95.1
50	밝은마을만들기 (가로등LED교체)사업 (주민참여예산)	LED등기구 교체 - 1식			76,000		70,148		5,852	92.3	도 보조
51	금마7공수~상제사거리 노후가로등 교체공사	가로등 설치 및 등기구 교체 - 1식			40,000		36,142		3,858	90.4	3회추경
52	영등동 가로환경 가로등정비사업 실시설계 용역	실시설계용역 - 1식			30,000		25,749		4,251	85.8	3회추경

9. 2020년도 각종 민원(진정·건의·청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
진정	▸편입되는 면적외에도 전부를 보상	맹*수	-익산제4산업단지~ 하나로하갈 교차로 지방도 확포장공사와 관련해서 삼기면 서두리252-10번지 편입되는 면적외에도 전부를 보상요청	-위 토지의 잔여지 판단기준을 종합적인 판단을 해야 할 사항으로 -현재는 분할측량 진행중이며 분할 후 질제 이용 현황을 고려하고 불편사항을 충분히 반영하여 사업 시행자인 전라북도와 업무협조를 통해 불편사항을 해소할 수 있도록 최선의 노력을 하겠음을 회신
진정	▸도로 편입토지 및 잔여 토지 매수 청구	임*식	- 함열읍 와리 308-21 도로편입 토지 및 잔여토지 매수 청구 요구	-위 토지는 대우연립~금성간 도로 확포장공사 편입토지로 일부가 현재도로로 사용되고 있으며, 도로로 편입된 부분을 붙할측량하여 감정평가 후 보상할 예정임을 회신
진정	▸도로 구조개선 사업으로 4m깊이의 웅덩이가 생겨농사를 지울 수 없음으로 복구 요구	박*칠	-왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선 사업으로 4m깊이의웅덩이가 생겨농사를 지울 수 없음으로 복구 요구	- 왕궁면 흥암리 711-1번지 일원에 배수시설물(수로관)등을 설계에 반영하였으며,추후 공사시에도 배수에 대하여 철저히 시공할 예정이므로 논이 물웅덩이가 되는 상황은 없을것임을 회신
진정	▸정동오거리~북부청사로 향하는 함열10길 정비요청(가로등설치)	채*수외49명	-정동오거리~북부청사로 향하는 함열10길 정비요청(가로등설치)	-정동오거리~북부청사로 향하는 함열10길 정비요청(가로등설치)는 올해 2회추경 또는 내년 본예산 확보하는 대로 가로등을 설치 할 수 있도록 하겠음을 알림

10. 기금 운용 관련

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□

□ 위원회 설치현황

위 원 회 명	설 치 근 거	구성원수	심의․의결․자문 기능여부	비고
소하천관리위원회	소하천정비법 제26조 (익산시 소하천관리 위원회 운영 규정)	7	심 의

□ 단체장이나 부기관장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회

위 원 회 명	위 원 장	비고
익산시 소하천관리위원회	건설국장

□ 위원회 명단

위원회명	소 속	구분	직위	성 명	비고
익산시 소하천관리 위원회	익산시	당연직	위원장	김용조
	익산시	당연직	부위원장	이용재
	익산시	당연직	위원	유원향
	익산시	당연직	위원	최영철
	㈜한가람 대표 및 군산대 겸임교수	위촉직	위원	류양규
	유)장흥건설기술공사	위촉직	위원	이수정
	군산대 교수	위촉직	위원	이창경

12. 용역사업 관련

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

									(단위 : 천원)
연번	구분	용 역 명		용역비		용역업체		납품 일자		용역기간	계약 방법	비고
	계	60건		3,988,647
1	설계 용역	금마 갈산~서편간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역		15,305		㈜한가람		2020. 01.20.		2019.06.14. ~ 2020.01.20.	1인 수의
2	재해영향평가용역	금마 갈산~서편간 도로확포장공사 소규모재해영향평가용역		27,903		㈜범산		2020. 07.27		2020.04.28. ~ 2020.07.27.	2인 이상 견적 수의
3	폐기물 용역	망성신성~관산간 도로확포장공사 폐기물처리용역		37,216		㈜에코 건설산업		2020. 09.02.		2018.09.28. ~ 2020.09.05.	2인 이상 견적 수의
4	폐기물 용역	망성신성~관산간 도로확포장공사 지정폐기물처리용역		6,164		㈜일진 도시환경		2020. 08.24.		2018.10.10. ~ 2020.08.24.	1인 수의
5	설계 용역	왕궁 온수-시대(황암-상발)간 도로확포장공사 실시설계용역		35,997		㈜예한 엔지니어링		2019. 05.29.		2019.02.11. ~ 2019.05.29.	2인 이상 견적 수의
6	환경영향평가용역	왕궁 온수-시대(황암-상발)간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역		16,661		㈜한가람		2020. 01.20.		2019.06.04. ~ 2020.01.20.	1인 수의
7	재해영향평가용역	왕궁 온수-시대(황암-상발)간 도로확포장공사 소규모재해영향평가용역		26,434		㈜세화 엔지니어링		2020. 08.10.		2020.05.13. ~ 2020.08.10.	2인 이상 견적 수의
8	폐기물 용역	춘포 토다리~덕동간 도로확포장공사 폐기물처리용역		105,981		㈜현성환경				2020.09.23. ~ 2022.03.22	경쟁 입찰
9	설계 용역	왕궁 군도26호선 도로확포장공사 실시설계용역		34,178		㈜우향 이앤씨				2019.02.18. ~ 2019.06.06. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
10	폐기물 용역	함라 칠성~다은간 도로확포장공사 건설폐기물처리용역		10,058		(유)가나환경		2020. 04.13.		2018.09.10. ~ 2020.04.23.	1인 수의
11	폐기물 용역	망성 군도10호~금지간 도로확포장공사 건설폐기물처리용역		19,166		㈜상현환경		2020. 08.24		2018.10.04. ~ 2020.09.12.	2인 이상 견적 수의
12	폐기물 용역	금마 누동~신촌간 도로확포장공사 건설폐기물처리용역		28,114		㈜상현환경				2018.10.03. ~ 2020.02.11. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
13	폐기물 용역	군도23호선 도로확포장공사 지정폐기물처리용역		4,075		㈜일진 도시환경		2020. 02.24.		2018.10.18. ~ 2020.03.25.	1인 수의
14	감리용역	군도23호선 도로확포장 지정폐기물 철거 감리용역		3,467		㈜건축법인 녹 엔지니어링 건축사사무소		2020. 06.01.		2019.09.24. ~ 2020.07.27.	1인 수의
15	설계 용역	익산시도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본 정비계획(변경)수립용역		140,281		㈜국성건설 엔지니어링				2019.11.22. ~ 2020.11.20. (일시중지)	경쟁 입찰
16	설계 용역	오산면소재지진입도로 확포장 실시설계용역		44,080		㈜주한 건설기술단		-		2019.08.30. ~ 2019.12.27. (일시중지)	경쟁 입찰
17	폐기물 용역	오산제일교회~정각사간 도로확포장공사 건설폐기물 처리용역		26,810		(유)진영환경		2020. 08.25.		2019.05.31. ~ 2020.08.25.	2인 이상 견적 수의
18	폐기물 용역	황등 도선~외화간 도로확포장공사 폐기물처리용역		50,357		(유)진영환경				2020.09.07. ~ 2022.03.13.	2인 이상 견적 수의
19	폐기물 용역	왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사 건설폐기물처리용역		36,987		(유)가나환경				2019.05.10. ~ 2020.07.22. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
20	설계 용역	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사 실시설계용역		30,077		㈜대한건설 연구원				2020.03.10. ~ 2021.03.10. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
21	재해영향평가용역	왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장공사 소규모재해영향평가용역		26,338		㈜세화 엔지니어링		2021. 03.12.		2020.11.05. ~ 2021.03.23.	2인 이상 견적 수의
22	설계 용역	금마 신정~중왕간 도로확포장공사 실시설계용역		44,359		㈜유현 이엔씨		2020. 12.22.		2018.10.02. ~ 2021.01.12.	2인 이상 견적 수의
23	설계 용역	춘포 오룡선 도로확포장공사 실시설계용역		29,343		㈜유현 이엔씨		2020. 05.08.		2019.07.15. ~ 2020.05.08.	2인 이상 견적 수의
24	설계 용역	황등 하동마을 ~동연지하차도간 도로개설공사 실시설계용역		38,100		㈜유현 이엔씨				2019.09.30. ~ 2020.02.15. (일시중지)	2인 이상 견적 수의	주민간 노선 협의 지연
25	설계 용역	춘 포 노적선 도로확포장공사 실시설계용역		50,829		태원 엔지니어링				2020.08.05. ~ 2020.11.08. (일시중지)	2인 이상 견적 수의	재해영향평가 추진중
26	재해영향평가용역	춘 포 노적선 도로확포장공사 소규모재해영향평가용역		26,270		㈜세화 엔지니어링				2020.12.07. ~ 2021.03.07. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
27	타당성조사용역	서부내륙고속도로 삼기 하이패스IC설치 타당성조사용역		61,909		㈜유현 이엔씨				2020.09.16. ~ 2021.03.15. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
28	설계 용역	백제왕도탐방로 (익산토성)조성공사 실시설계용역		29,377		㈜예한 엔지니어링				2020.09.07. ~ 2020.12.08. (일시중지)	2인 이상 견적 수의	재해영향평가 추진중
29	재해영향평가용역	백제왕도탐방로 (익산토성)조성공사 소규모재해영향평가용역		33,854		㈜더한건설				2020.12.15. ~ 2021.06.30. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
30	폐기물 용역	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선사업 폐기물처리용역		24,777		(유)다일 환경산업		2020. 06.11.		2019.06.04. ~ 2020.06.11.	2인 이상 견적 수의
31	설계 용역	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 실시설계용역		67,632		(유)수오건설		2020. 07.10.		2019.10.16. ~ 2020.07.10.	경쟁 입찰
32	환경영향평가용역	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 소규모환경영향평가용역		16,701		㈜한가람		2020. 05.27.		2020.02.06. ~ 2020.05.27.	1인 수의
33	재해영향평가용역	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선사업 소규모재해영향평가용역		26,063		㈜범산		2021. 03.12.		2020.11.18. ~ 2021.04.05.	2인 이상 견적 수의
34	설계 용역	낭산농협~시명마을간 선형개량사업 실시설계용역		23,683		㈜동운		2020. 06.08.		2020.02.20. ~ 2020.06.08.	2인 이상 견적 수의
35	설계 용역	신왕교차로 회전교차로 설치사업 실시설계용역		16,889		㈜대한건설 연구원		2020. 06.25.		2020.02.05. ~ 2020.07.04.	1인 수의
36	폐기물 용역	신왕교차로 회전교차로 설치사업 폐기물처리용역		24,915		(유)가나환경		2020. 12.14.		2020.08.05. ~ 2021.02.04.	1인 수의
37	기술 용역	동면천하천정비사업 실시설계용역(2차분)		105,330		㈜경호		2018. 07.06.		2018.05.08. ~ 2018.07.06.	일반 경쟁	일시정지 (2018.6.12.) 기본계획변경에 따른설계조정
38	기술 용역	동면천하천정비사업 소규모환경영향평가용역		39,580		㈜동아 기술공사		2020. 09.19.		2017.11.02. ~ 2020.09.19.	2인 이상 견적 수의
39	기술 용역	동면천 하천정비사업 설계경제성 검토 용역		15,606		㈜한가람		2020. 02.14.		2019.12.02. ~ 2020.02.14.	1인 견적 수의
40	일반 용역	동면천 하천정비사업 문화재 시굴조사용역		47,143		(재)전라문화 유산연구원		2019. 07.21.		2019.05.10. ~ 2019.07.21.	2인 이상 견적 수의	일시정지 (19.6.19.) 사유지보상협의중
41	기술 용역	왕궁천하천정비공사 건설사업관리용역 (1지구 1차분)		607,360		㈜동성 엔지니어링 외 2		2020. 07.18.		2018.09.03. ~ 2020.07.18.	일반 경쟁
42	기술 용역	왕궁천하천정비공사 건설사업관리용역 (1지구 2차분)		424,710		㈜동성 엔지니어링 외 2		2022. 04.14.		2020.07.16. ~ 2022.04.14.	일반 경쟁
43	일반 용역	왕궁천하천정비공사 입목폐기물 처리용역 (1지구)		18,603		(유)해머		2021. 03.09.		2020.02.27. ~ 2021.03.09.	1인 견적 수의
44	일반 용역	왕궁천 하천정비공사 폐기물처리용역 (1지구)		310,327		(유)옥천환경		2021. 4.30.		2019.5.10. ~ 2021.4.30.	일반 경쟁
45	기술 용역	왕궁천하천정비공사 건설사업관리용역 (2지구 1차분)		300,000		㈜이산 외 1		2020. 11.12.		2020.02.17. ~ 2020.11.12.	일반 경쟁
46	기술 용역	왕궁천하천정비공사 건설사업관리용역 (2지구 2차분)		400,000		㈜이산 외 1		2021. 11.07.		2020.11.13. ~ 2021.11.07.	일반 경쟁
47	일반 용역	왕궁천하천정비공사 폐기물 처리용역 (2지구 1차분)		33,624		(유)다일 환경산업		2020. 12.05.		2020.08.06. ~ 2020.12.05.	2인 이상 견적 수의
48	일반 용역	왕궁천하천정비공사 폐기물 처리용역 (2지구 1차 추가분)		39,223		(유)진영환경		2021. 02.17.		2020.10.21. ~ 2021.02.17.	2인 이상 견적 수의
49	일반 용역	동산천소하천정비공사 폐기물처리용역		87,713		(유)다일 환경산업		2021. 05.30.		2019.12.05. ~ 2021.05.30.	지역 제한
50	기술 용역	닭작골천소하천정비공사 실시설계용역		91,087		(유)새터 이엔지		2020. 01.11.		2019.03.27. ~ 2020.01.11.	지역 제한
51	기술 용역	닭작골천소하천정비공사 토질조사용역		57,587		㈜천마 종합건설		2020. 01.15.		2019.03.29. ~ 2020.01.15.	지역 제한
52	폐기물처리용역	2019년 여산면 강경천 하천 내 잡목제거공사 임목폐기물 처리용역		35,860		(유)제일환경산업		2020. 03.16.		2020.01.29. ~ 2020.04.09	경쟁 입찰
53	실시설계	2020년 하천 유지보수사업 6건 실시설계영역		19,697		㈜주한건설 기술단		2020. 04.06.		2020.01.28 ~ 2020.04.26	1인 수의
54	환경영향평가	만경강 목천지구 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가용역		19,701		주식회사 한가람		2020. 09.01.		2020.02.10 ~ 2020.09.08	1인 수의
55	공공디자인용역	만경강 목천지구 파크골프장 조성 경관(공공디자인)심의용역		15,048		DN		2020. 04.22.		2020,02.11, ~ 2020.05.25	1인 수의
56	폐기물처리용역	2019년 고창천 수로암거 보수공사 건설폐기물처리용역		4,087		㈜에코건설 산업		2020. 03.09.		2020.03.02 ~ 2020.05.12	1인 수의
57	안전점검용역	2020년 하반기 목천지구 오산제 등 9개소 정기안전점검용역		10,890		주식회사 선진이엔씨		2020. 12.15.		2020.11.29 ~ 2020.12.29	1인 수의
58	실시설계용역	2021년 하천 유지보수사업 6건 실시설계용역		19,673		㈜주한건설 기술단				2020.12.16 ~ 2021.04.06	1인 수의
59	실시설계용역	2021년 하천 유지보수사업 7건 실시설계용		19,699		(유)장흥건설기술공사				2020.12.16 ~ 2021.04.06	1인 수의
60	실시설계 용역	영등동 가로환경가로등 정비사업 실시설계용역		25,749		㈜남양기술단		2020. 12.28.		2020.09.14. ~ 2020.12.28.	1인 수의

13. 인․허가 민원 관련

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

14. 각종 공사 설계 변경상황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

										(단위 : 천원)
연번	사업명	예산액		계약액 (변경액)		계약자		계약 일자	변경 일자		공 사 기 간	변경사유
계	22건	24,612,966		13,509,199 (14,022,547)
1	군도23호 도로확포장 지정폐기물 철거공사 (흘산리189-14)	4,802,888		8,105 (8,525)		(주)선진건설		2020. 02.04	2020. 04.24		2020.02.24. ~ 2020.05.23.	누락물량 반영, 보험료정산 등
2	군도23호 도로확포장 지정폐기물 철거공사	4,802,888		26,400 (18,310)		㈜삼경		2018. 11.26.	2020. 05.11.		2018.11.26. ~ 2020.08.10.	물량 감조정
3	군도23호선 도로확포장공사	4,802,888		6,839,845 (6,842,823)		(주)남북건설		2018. 05.11.	2020. 06.08.		2018.05.28. ~ 2021.06.11.	토지매입이 지난한 구간 잔여분으로 이월 시공
4	망성 신성~관산간 도로확포장공사	467,076		591,853 (598,976)		(유)삼운종합건설		2019. 09.23	2020. 08.03.		2019.09.23. ~ 2020.06.26.	타절준공 시행
5	용안창리~법성간 도로확포장공사	846,918		948,605 (885,692)		(유)송덕건설		2019. 05.24.	2020. 06.02.		2019.05.28. ~ 2020.07.30.	교통안전시설물 협의 익산경찰서)의견반영
6	함라칠성~다은간 도로확포장공사	198,843		571,764 (590,978)		㈜광진건설		2019. 11.11.	2020. 04.29.		2019.11.11. ~ 2020.05.23.	교통안전시설물 협의 (익산경찰서)의견 반영
7	망성군도10호~금지간 도로확포장공사	409,622		622,352 (661,061)		(유)씨랜드		2018. 10.11	2020. 08.21		2018.10.15. ~ 2020.09.11.	교통안전시설물 협의 익산경찰서)의견반영
8	오산제일교회~정각사간 도로확포장공사	569,772		376,791 (372,753)		㈜신성건설		2019. 06.05.	2020. 01.16		2019.06.05. ~ 2020.08.14.	민원사항 반영
9	오산제일교회~정각사간 도로확포장공사	569,772		372,753 (370,136)		㈜신성건설		2019. 06.05.	2020. 05.19		2019.06.05. ~ 2020.10.22.	집수정 기성품으로 변경, 폐기물 물량 반영
10	오산제일교회~정각사간 도로확포장공사	569,772		367,859 (393,023)		㈜신성건설		2019. 06.05.	2020. 09.02		2019.06.05. ~ 2020.10.22.	교통안전시설물 협의 익산경찰서)의견반영
11	왕궁 양동마을 진입도로확포장공사	432,956		827,730 (862,001)		㈜이산건설		2019. 05.24.	2020. 08.12.		2019.06.03. ~ 2021.01.26.	누락물량 반영
12	용안 난포삼거리 위험도로구조개선공사	373,874		354,650 (347,144)		(유)성서종합건설		2019. 12.02.	2020. 06.22.		2019.12.02. ~ 2020.08.03.	교통안전시설물 협의 익산경찰서)의견반영
13	신왕교차로 회전교차로 설치사업	280,000		239,566 (238,466)		(유)성우토건		2020. 08.04.	2020. 12.03.		2020.08.04. ~ 2021.02.03.	현장여건 반영, 경찰서 의견 반영 등
15	왕궁천 하천정비공사 (왕궁1지구)2차분	622,000		622,000 (601,800)		㈜시티 외 1		2019. 04.24.	2020. 08.13.		2019.04.29. ~ 2020.08.15.	장기계속공사 차수간 공종변경
17	동산천 소하천정비공사 1차분	290,501		207,577 (139,500)		(유)도갑건설		2019. 12.06.	2020. 04.16.		2019.12.12. ~ 2020.04.01.	장기계속공사 차수간 공종변경
18	동산천 소하천정비공사 2차분	1,420,096		324,854 (871,578)		(유)도갑건설		2020. 04.01.	2020. 12.23.		2020.04.02. ~ 2021.01.02.	장기계속공사 차수간 공종변경 (523백만원) 및 물가변동(24백만원)
19	2019년 고창천 수로암거 보수공사	296,000		26,861 (37,334)		(유)은산		2019. 11.15.	2020. 02.27.		2019.11.19. ~ 2020.03.07.	PC암거 설치위한 현장정리 및 미반영된 지반정리 등 설계에 추가반영 등
20	2019년 용안생태공원 내 초화류 식재공사	1,568,000		110,902 (110,000)		㈜가온조경		2019. 12.17	2020. 06.12		2019.12.18. ~ 2020.07.24.	초화류 고사방지위한 준공 후 물주기 반영, 건강 및 연금보험 등 정산
21	2020년 어량천 하천준설공사	1,189,100		30,431 (28,486)		주식회사 성민건설		2020. 04.16	2020. 07.16		2020.04.22. ~ 2020.10.23.	운반거리 변경 (감소) 건강 및 연금보험 등 정산
22	도심지역노후가로등교체공사	100,000		38,301 (43,961)		(유)은광전력		2020. 03.16.	2020. 04.16.		2020.03.23. ~ 2020.04.20.	현장여건에 따른 시공 변경 등

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

8번항목 주요사업 조서와 같음

16. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

(단위 : 천원, %)

연번	사 업 명	사업개요	예산액	집행액	잔 액	집행률	비고
	계	8건	12,982,781	4,707,965	8,274,816	36.3
1	용안난포사거리 위험도로구조개선	위험도로 구조개선 1식	373,874	355,993	17,881	95.2	국비
2	왕궁신호~용남 위험도로구조개선	L=0.5km B=8.0m	486,000	80,000	406,000	16.5	국비
3	낭산~시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m	100,000	23,683	76,317	23.7	국비
4	신왕교차로 회전 교차로 설치사업	회전교차로 설치 1식	280,000	171,071	108,929	61.1	국비
4	지방하천정비 (왕궁천)	하천정비사업 L=9.2㎞	8,893,357	3,137,648	5,755,709	35.3	도비 (원인행위 8,206,624) 93%
5	지방하천정비 (동면천)	하천정비사업 L=3.05㎞	1,996,400	88,855	1,907,545	5.0	하천기본 계획변경 따른 실시설계조정정
6	하천제방유지보수	관내 지방하천(187km) 유지보수 1식	300,150	300,150	0	100.0	도비208,000 명시92,150
7	국가하천유지관리(4대강)	국가하천 (금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	355,000	353,845	1,155,	99.7	국비
8	국가하천유지관리(4대강외)	국가하천 (만경강18km) 유지관리 1식	198,000	196,720	1,280	99.4	국비

18. 2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

▢ 이월사업 개요	47건/14,828,468천원

▶ 명시이월 : 30건 / 11,036,508천원

▶ 사고이월 : 17건 /  3,791,960천원

(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
	계	33건	14,828,466	7,957,929	6,870,537	53.7
1	금마갈산~서편간 도로확포장공사	L=1.6km B=8.0m	456,165	292,331	163,834	64.1	명시
2	망성신성~관산간 도로확포장공사	L=0.91km B=7.0m	417,076	343,894	73,182	82.5	명시327,000 사고 90,076
3	오산장신~만석간 도로확포장공사	농경지 연결도로 포장 33개소	3,978	1,400	2,578	35.2	명시
4	왕궁온수~시대간(황암~상발)도로확포장공사	L=1.7km B=8.0m	284,394	74,785	209,609	26.3	사고
5	춘포토다리~덕동간 도로확포장공사	L=1.0km B=8.0m	701,262	325,212	376,050	46.4	명시450,000 사고251,262
6	왕궁군도26호선(리도210호) 도로확포장공사	L=1.7km B=8.0m	213,632	19,770	193,862	9.3	명시
7	용안창리법성간 도로확포장공사	L=0.84km B=8.0m	616,918	616,918	0	100.0	명시477,658 사고139,260
8	함라칠성~다운간 도로확포장공사	L=1.0km B=8.0m	198,842	101,487	97,355	51.0	명시164,729 사고34,113
9	망성군도10호금지간 도로확포장공사	L=1.2km B=8.0m	359,621	359,621	0	100.0	명시339,345 사고20,276
10	금마누동~신촌간 도로확포장공사	L=1.01km B=8.0m	319,409	21,041	298,368	6.6	명시180,000 사고139,409
11	시군농어촌도로 확포장사업	농어촌도로사업추진	5,598	5,598	0	100.0	명시
12	군도23호선 도로확포장공사	L=3.4㎞ B=16.5-20.5m	4,802,888	2,310,819	2,492,069	48.1	명시2,906,219 사고1,896,669
13	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본계획용역	기본계획 1식	117,920	0	117,920	0	명시
14	어양동어곳~부평간 도로확포장공사	L=0.8km B=8.0m	71,131	71,111	20	100.0	명시65,756 사고5,375
15	오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사	L=0.95km B=23.0m	525,670	1,481	524,189	0.3	명시500,000 사고25,670
16	오산제일교회~정각사간 (리도203호)도로확포장공사	L=0.4km B=8.0m	399,772	393,431	6,341	98.4	명시339,965 사고59,807
17	황동도선~외화간(면도104호) 도로확포장공사	L=0.7km B=8.0m	334,200	66,008	268,192	19.8	명시300,000 사고34,200
18	오산역~상아마을간(리도203호) 병목구간도로확포장공사	L=0.2km B=7.0~8.0m	182,160	27,736	154,424	15.2	명시
19	하나로~소간촌간(리도203호) 도로확포장공사	L=1.0km B=8.0m	567,009	40,720	526,289	7.2	명시499,980 사고67,029
20	왕궁양동마을진입도로 (리도207호)확포장공사	L=0.6km B=8.0m	352,956	269,184	83,772	76.3	명시323,107 사고29,849
21	춘포창평마을진입도로 (농도308호)확포장공사	L=0.7km B=8.0m	100,000	0	100,000	0	명시
22	왕궁금오동~군도22호간도로 (면도102호)확포장공사	L=0.55km B=8.0m	259,598	15,041	244,557	5.8	명시
23	금마신정~증왕간도로 (리도202호)확포장공사	L=1.2km B=8.0m	535,577	337,379	198,198	63.0	명시500,000 사고35,577
24	춘포오룡선도로확포장공사	L=0.5km B=8.0m	110,808	103,156	7,652	93.1	명시
25	황등면하동마을~동연지하차도 우회도로개설공사	L=0.7km B=8.0m	500,000	0	500,000	0	명시
26	용안난포사거리 위험도로구조개선	위험도로 구조개선 1식	373,874	355,993	17,881	95.2	사고
27	왕궁신호~용남 위험도로구조개선	L=0.5km B=8.0m	80,000	80,000	0	100.0	명시
28	평화육교재가설	L=233㎞ B=35m	305,122	278,449	26,673	91.3	사고
29	소하천정비 (동산천)	소하천정비 L=1.018km	237,797	237,797		100.	명시
30	소하천정비 (닭작골천)	소하천정비 L=1,4km	269,413	81,891	187,522	30.4	명시 사업부서이관 (시민안전과)
31	만경강 문학관 토지매입비	토지매입 1식	50,000	50,000	0	100.0	명시
32	하천제방유지보수	관내지방하천 (187km) 유지보수 1식	92,150	92,150	0	100.0	명시
33	하천제방유지보수(자체)	관내 소하천 (102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식	983,526	983,526	0	100.0	명시

19. 2020년 예산 중 2021년 명시 및 사고이월 내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

							(단위 : 천원)
연번	사 업 명	사업개요		예산액		집행액		이월액	비고
	계	30건		17,504,782		8,904,935		8,599,847
1	금마갈산~서편간 도로확포장공사	L=1.6km B=8.0m		656,165		292,331		363,834	명시 200,000 사고 163,834
2	춘포토다리~덕동간 도로확포장공사	L=1.0km B=8.0m		701,262		325,212		376,050	사고
3	왕궁군도26호선(리도210호) 도로확포장공사	L=1.7km B=8.0m		213,632		159,684		53,948	사고
4	금마누동~신촌간 도로확포장공사	L=1.01km B=8.0m		319,409		139,409		180,000	사고
5	군도23호선 도로확포장공사	L=3.4㎞ B=16.5-20.5m		4,802,888		2,642,735		2,160,153	사고
6	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본계획용역	기본계획 1식		117,920		19,719		98,201	사고
7	어양동어곳~부평간 도로확포장공사	L=0.8km B=8.0m		371,131		312,659		58,472	명시
8	오산면소재지진입도로 (군도2호)확포장공사	L=0.95km B=23.0m		1,025,670		25,670		1,000,000	명시 500,000 사고 500,000
9	황동도선~외화간(면도104호) 도로확포장공사	L=0.7km B=8.0m		334,200		66,008		268,192	사고
10	오산역~상아마을간(리도203호) 병목구간도로확포장공사	L=0.2km B=7.0~8.0m		182,160		27,736		154,424	사고
11	하나로~소간촌간(리도203호) 도로확포장공사	L=1.0km B=8.0m		567,009		69,339		497,670	사고
12	왕궁양동마을진입도로 (리도207호)확포장공사	L=0.6km B=8.0m		432,956		331,993		100,963	명시 17,191 사고 83,772
13	춘포창평마을진입도로 (농도308호)확포장공사	L=0.7km B=8.0m		100,000		69,923		30,077	사고
14	왕궁금오동~군도22호간도로 (면도102호)확포장공사	L=0.55km B=8.0m		259,598		15,041		244,557	사고
15	금마신정~증왕간도로 (리도202호)확포장공사	L=1.2km B=8.0m		535,577		337,379		198,198	사고
16	춘포오룡선 도로확포장공사	L=0.5km B=8.0m		110,808		103,156		7,652	사고
17	황등면하동마을~동연지하차도 우회도로개설공사	L=0.7km B=8.0m		500,000		0		500,000	사고
18	춘포 노적선 도로확포장공사	L=0.4km B=8.0m		100,000		0		100,000	명시
19	시도31호 도로확포장 사업	타당성조사 1식		70,000		0		70,000	명시
20	백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	L=1.74km B=5.0m		70,000		0		70,000	명시
21	왕궁신호~용남 위험도로구조개선	L=0.5km B=8.0m		486,000		84,333		401,667	명시
22	낭산~시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m		100,000		23,683		76,317	명시
23	신왕교차로 회전교차로 설치사업	회전교차로 1식		280,000		171,071		108,929	명시
24	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	보상금		1,500,000		874,924		625,076	명시
32	동산천소하천정비공사	소하천정비 L=1,018km		1,834,797		1,464,187		370,610	명시
28	하천제방유지보수 (자체)	소하천 및 지방하천 유지보수 1식		1,189,100		752,488		436,612	명시
30	만경강 물문학관 토지매입비	토지매입 1식		644,500		596,255		48,245	명시

20. 예산 전용사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

21. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

22. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

23. 국․도비 반납 현황 및 사유(2020년반납건)

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

(단위: 천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	반 납 액	반납사유	비고
국가하천유지관리 (4대강 외)	294,963	241,730	564	2018년 국가하천 유지보수 반납금에대한 이자 (익산지방국토관리청)	국비
국가하천유지관리 (4대강 외)	160,000	156,608	3,422	2019년 국가하천 유지보수 집행 잔액 및 이자 (익산지방국토관리청)	국비
국가하천유지관리 (4대강)	381,000	379,881	1,129	2019년 국가하천 유지보수 집행 잔액 및 이자 (대전지방국토관리청)	국비
국가하천유지관리 (4대강 외)	198,000	196,720	1,280	2020년 국가하천 유지보수 집행 잔액 (익산지방국토관리청)	국비 (예정)
국가하천유지관리 (4대강)	395,000	393,845	1,155	2020년 국가하천 유지보수 집행 잔액 (대전지방국토관리청)	국비 (예정)
보안등신설 (인북로22길 12) 외 3개 사업	3,150	2,908	242	집행 잔액 (2019년 사업)	도비

24. 2020년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

25. 2020년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

26. 2020년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

27. 2020년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

(단위 : 백만원)

연번	위치	사 업 명	사 업 개 요	사업 기간	사 업 비					사업 구분	공정	비고
					총 사업비	기투자	이월액	2020 예산	금 후
1	오산	오산면소재지 진입도로 확포장	L=0.95km B=23.0m	2018 ~ 2022	5,000	500	500	500	4,000	도로	보상중
2	춘포	춘포 노적선 도로확포장	L=0.4km B=8.0m	2020 ~ 2022	700	0	0	100	600	도로	설계중
3	삼기	시도31호 도로확포장	타당성조사 1식	2020	70	0	0	70	0	도로	용역중	3회추경
4	금마	백제왕도 탐방로 조성 (익산토성)	L=1.74km B=5.0m	2020 ~ 2022	1,355	0	0	70	1,285	도로	설계중	3회추경

28. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임대성	□

해 당 사 항 없 음

29. 소송 사건 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

사건번호	사건명	원 고	피 고	접수일	변호사 선임사항	추진사항 (판,종결일)
2019나 2042632	공사대금 청구의 소	지에스건설 ㈜	한국철도시설공단 (익산시)	2019.9.16.	김종성 법률사무소	2020.12.04. (종국) 원고 항소취하
2020구합2087	영업손실 보상금 증액 청구	윤덕실	익산시	2020.11.26.	정남기 법률사무소	변론기일 2021.04.01. 다음기일 2021.06.03. 진행중

30. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

□ 민원접수 현황

연번	관 련 민 원	접수건수	처리건수	비 고
	계	57	57
1	도로개설 및 확포장 관련 민원	3	3	시정에바란다
2	가로등·보안등관련 민원	40	40
3	하천관련 민원	14	14

□ 주요처리현황

◦ 세계유산 추가등재진행중인 토성~쌍능길(비포장길)도로정비 요청

▸도로(금마면 서고도리 산50-3 일원)는 농어촌도로 금마리도 202호 도로로, 현재 사업 추진중에 있었으며,

국가지정문화재 주변 공사 행위를 하는 경우엔 문화재청 현상변경 허가 대상으로 현재 문화재청에서

현상변경허가를 완료(2020.07.06.)한 상태입니다.

▸추후 실시설계용역 등을 발주하여 사업이 진행될 예정이며, 빠른 시일 내에 불편이 개선 될수 있도록

사업 추진에 만전을 기하겠음

◦ 폭우로 인한 비닐하우스 침수피해 보상

▸집중호우로 인한 왕궁천 무제부구간 배수기능 상실로 발생한 천재지변적 불가항력 사안으로

시공사의 피해보상은 불가함을 회신

◦ 하천 친수지역 쓰레기 처리 및 제방 등 유지관리 요청

▸하천 내 환경정비사업 일환으로 쓰레기를 수거하고 일정장소에 집하하였으며, 조속한 시일내에 처리할 계획, 또한 안내표지판 설치, 상시 순찰 및 단속을 지속적으로 실시하여 깨끗한 하천으로 조성될 수 있도록 노력하겠음

▸제방 등 하천시설물에 대하여 가능한 빠른 시일 내 응급복구를 완료하고 추후 예산 확보 등을 거쳐 영구보수가 이루어 질수 있도록 노력하겠음

▸만경강 파크골프장 등 체육시설 및 금강 용안생태습지에 대하여 정규적인 환경정비(청소,풀깎기 등)으로 청결한 환경을 유지하도록 노력하겠음

◦ 제일아파트, 버스터미널 등 평화동 지역 가로등 조도개선 요청

▸해당지역의 고장난 가로등 5개소를 보수완료하고 노후된 가로등은 램프, 등기구 교체 등 지속적으로 조도개선을 실시하겠음을 알림

31. 시설‧사무 민간위탁 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

32. 의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

33. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

34. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

35. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

36. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

해 당 사 항 없 음

감사자료 과 요구사항

1. 2020년도 시･군도 농어촌도로 확포장 사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

□ 진행중인 시군도 및 농촌도로 현황(이월 및 계속사업)

										(단위 : 백만원)
연번	사 업 명	사업개요		예 산 액							추진실적	노선명	비고
				총 사업비		기투자		2020년 예산액	금후 투자
계	32개사업			55,931		27,512		4,106	24,313
1	군도23호선 도로확.포장	L=3.4km B=16.5-20.5m		12,500		11,500		0	1,000		공사중	군도 23호
2	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m		2,829		779		200	1,850		공사중	금마 101 (서삼선)
3	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m		1,248		1,198		50	0		준공	망성303 (신선선)
4	오산 장신~만석간 도로확.포장	농경지연결 도로 33개소		1,034		1,034		0	0		준공	농어촌도로
5	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m		2,803		616		0	2,187		설계중	군도 21호
6	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,920		877		0	1,043		공사중	춘포 103 (신화선)
7	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m		2,970		797		0	2,173		설계중	왕궁 210 (신기선)
8	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m		1,480		1,250		230	0		준공	용안 203 (자석선)
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,001		1,001		0	0		준공	함라 201 (진다선)
10	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		1,105		1,055		50	0		준공	망성 102 (수용선)
11	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m		800		685		0	115		공사중	금마 102 (누부선)
12	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	정비계획 1식		320		160		0	160		용역중	농어촌도로
13	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m		3,100		950		300	1,850		보상중	시도 1268
14	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.95km B=24.0m		5,000		600		500	3,900		보상중	군도 2호
15	오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m		870		700		170	0		준공	오산 203 (신수선)
16	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m		1,000		400		0	600		공사중	황등 104 (황팔선)
17	오산역 –상아마을간 도로확.포장	L=0.2km B=8.0m		200		200		0	0		보상중	오산 203 (신수선)
18	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,400		600		0	800		설계중	삼기 203 (석라선)
19	왕궁 양동마을 진입도 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		1,310		700		80	530		공사중	왕궁 207 (양곡선)
20	춘포 창평마을 진입도로 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m		1,500		100		0	1,400		설계중	춘포 308 (창평선)
21	왕궁 금오동~군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m		1,000		300		0	700		설계중	왕궁 102 (농장선)
22	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		1,500		600		0	900		설계중	금마 202 (서오선)
23	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m		1,000		130		0	870		보상중	춘포 102 (오룡선)
24	황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		1,250		500		0	750		설계중	농어촌도로
25	춘포 노적선 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m		700		0		100	600		설계중	춘포311 (노적선)
26	시도31호 도로확.포장	타당성조사 1식		70		0		70	0		용역중	서부내륙 고속도로
27	백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	L=1.74km B=8.0m		1,355		0		70	1,285		설계중	농어촌도로
28	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식		700		700		0	0		준공	지방도 706 용안 201	특교 700
29	왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업	L=0.5km B=8.0m		486		80		406	0		설계중	군도 19호	국고 243
30	낭산~시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m		1,000		0		100	900		설계중	군도 9호	국고 500
31	신왕교차로 회전교차로 설치사업	회전교차로 1식		280		0		280	0		준공	지방도 723, 시도 68호 (증왕선)	국고 140
32	하나로~4산단간 지방도 도로확.포장	보상비		2,200		0		1,500	700		보상중	지방도 718

□ 2020년도 신규 사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2020 예산	금후
계	6개소		5,605	0	2,120	3,485
춘포 노적선 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	2020 ~ 2022	700	0	100	600	설계중
시도31호 도로확.포장	타당성조사 1식	2020 ~ 2021	70	0	70	0	용역중
백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	L=1.75km B=8.0m	2020 ~ 2022	1,355	0	70	1,285	설계중
낭산~시영 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m	2020 ~ 2022	1,000	0	100	900	설계중
신왕교차로 회전교차로 설치사업	회전교차로 1식	2020 ~ 2021	280	0	280	0	준공	2021.01.
하나로~4산단간 지방도 도로확.포장	보상비	2020 ~ 2022	2,200	0	1,500	700	보상중

□ 2020년 준공된 사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2020 예산	금후
계	6개소		6,354	5,904	450	0
망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	2018 ~ 2020	1,248	1,198	50	0	준공	2020.08.23.
용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	2017 ~ 2020	1,480	1,250	230	0	준공	2020.06.22.
함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2017 ~ 2020	1,001	1,001	0	0	준공	2020.05.18.
망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	2017 ~ 2020	1,055	1,055	0	0	준공	2020.09.10.
오산 제일교회~정각사간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m	2018 ~ 2020	870	700	170	0	준공	2020.08.26.
용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	회전교차로 1식	2018 ~ 2020	700	700	0	0	준공	2020.06.29.

□ 2020년도 예산 미확보사업(이월및계속사업)

해 당 사 항 없 음

2. 군도 23호선 도로 확·포장사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로~ 삼기 일반산업단지

○ 사업기간 : 2016. ~ 2021. 6.

○ 사 업 량 : 도로확포장 L=3.4km, B=16.5~20.5m (2차로⇒4차로)

○ 총사업비 : 125억원(공사비 90  보상비 31  기타 4)

□ 추 진 실 적

○ 지방재정 투융자 심사	: 2013. 6.  4.

○ 도시계획 시설결정 및 실시설계 용역	: 2013. 7.~2015. 1.

○ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시	: 2015. 6. 15.

○ 실시계획인가 고시(익산시 고시 제 2016-4호)	: 2016. 1.  8.

○ 감정평가 및 손실보상	: 2016. 6.~현재

○ 지방재정투자 (재)심사	: 2017. 5. 19.

▸총사업비 변경 : 78억원 → 125억원

○ 공사 착공(1차분)	: 2019. 5. 28.

○ 공사 완료(1차분)	: 2020. 6. 10.

○ 공사 착공(2차분)	: 2020. 7.  4.

▸공사 공정율 – 85%(포장공)

□ 향 후 계 획

○ 잔여토지 손실보상 및 수용재결	: 2021. 1.~6.

○ 공사 완료	: 2021. 6.

3. 평화육교 재가설 사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	도로시설계장		임 대 성	□

□ 필  요  성

○ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및 KTX
호남고속철도 완전한 정상화 실현

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

○ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2021. 9.

○ 사 업 량 : 교량 재가설 L=366m(4차로⇒6차로)

○ 총사업비 : 531억원(국비 307  시비 224)

○ 사업시행 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

○ 평화육교 재가설 사업 건의(기획재정부 등)	: 2011. ~ 2014.

○ 국비 지원 확정(기재부 총사업비 승인)	: 2015. 4. 6.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(한국철도시설공단)	: 2015. 11.~2017. 4.

○ 평화육교 재가설 공사 추진	: 2017.  7. ~ 현재

▸ 대체우회도로 설치(4차로)	: 2018.  7.

▸ 육교 철거(전면통제 2018. 7 ~ 공사 완료시)	: 2018.  7. ~ 12.

※ 전체 공정율 76%

□ 향 후 계 획

○ 평화육교 완전개통	: 2021. 6.

○ 공사완료	: 2021. 9.

4. 왕궁천 하천 정비사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명		위 치	사업기간 (공사기간)	사 업 비	사업 내용
왕궁천 하천환경 정비사업		춘포면 익산천 합류점 ~ 왕궁면 동용리	2015.~2022.	47,368 (국10,093 도23,065 시14,210)	하천정비 L=9.25km (축제 및 보축, 교량가설등)
	1지구	익산천 합류점 (춘포면) ~흥암교	(2019.~2022.)	23,693 (국5,046 도11,537 시7,110)	하천정비 L=4.62km (축제 및 보축, 교량가설등) ▸착공 : ‘19.3.11.
	2지구	흥암교 ~보석박물관 (왕궁면 동용리)	(2020.~2022.)	23,675 (국5,047 도11,528 시7,100)	하천정비 L=4.63km (축제 및 보축, 교량가설등) ▸착공 : ‘20.3.3.

□ 추 진 실 적

○ 1지구 공사(장기계속공사) 착수	: 2019.   3.

○ 1지구 1차분 공사 준공	: 2019.  12.

○ 1지구 3차분 공사 착수	: 2020.   1.

○ 1지구 2차분 공사 준공	: 2020.   8.

○ 2지구 공사(장기계속공사) 착수	: 2020.   3.

□ 향 후 계 획

○ 공사(1, 2지구) 준공	: 2022.  12.

5. 동면천 하천 정비사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
동면천 하천환경 정비사업	왕궁면 동촌리~ 왕궁면 부상천 합류점	2017.~2023.	15,489 (국1,000 도9,842 시4,647)	하천정비 L=3.05km (제방축조 및 보축, 교량가설등) ▸실시설계 용역중 : 90%

□ 추 진 실 적

○ 주민설명회(2회)	: 2018.   4. ~ 10.

○ 실시설계 협의(익산지방국토관리청, 1차)	: 2018.   7.

○ 동면천 하천기본계획 변경 고시(국토부)	: 2019.   8.

○ 동면천 사업기한 조정 승인(2020 → 2023)	: 2019.  10.

○ 설계경제성 검토	: 2020.   2.

○ 소규모 환경영향평가 협의	: 2020.   6.

○ 편입토지 분할	: 2020.  11.

○ 실시설계 협의(전라북도, 2차)	: 2021.   3.

○ 편입토지 보상 추진	: 2021.   4.

□ 향 후 계 획

○ 건설기술심의(전라북도)	: 2021.   5.

○ 총사업비 협의	: 2021.   6.

○ 하천공사 추진	: 2021.   7.

6. 소하천 정비사업 (동산천)

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천시설계장		김 완 수	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
동산천 소하천 정비사업	웅포면 맹산리 일원	2018.~2021.	3,210(국353 시2,857)	하천정비 L=1.018km (축제 및 보축, 교량가설 등) ▸공정률: 80%

□ 추 진 실 적

○ 사전설계검토(전북도)	: 2019.   1.

○ 보상계획 공고	: 2019.   2.

○ 부서 협의 및 원가심사	: 2019.   4.

○ 공사(장기계속공사) 착수	: 2019.  12.

○ 1차분 공사 준공	: 2020.   4.

○ 2차분 공사 준공	: 2020.  12.

□ 향 후 계 획

○ 전체분 공사 준공	: 2021.   6.

7. 만경강 문화관 조성사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

○ 사업기간 : 2015. ~ 2021.12.

○ 사 업 비 : 11,350백만원(국비 10,000  시비 1,350)

○ 사업내용

▸규    모 : 부지 13,814㎡(지하 1층, 지상2층, 연면적 1,686㎡)

▸주요시설 : 생태전시 및 홍보관, 다목적실, 로비, 사무실 카페테리아등

○ 사업시행/보상시행 : 익산지방국토관리청 / 익산시(토지7필지, 지장물 7동)

□ 추 진 실 적

○ 만경강 하천환경정비사업 시행에 따른 물문화관 건립요청(익산청)	: 2015. 3. 17.

○ 문화관 조성에 따른 MOU 체결(익산시,김제시,익산지방국토관리청)	: 2017. 4. 7.

○ 만경강문화관 실시설계 완료	: 2017.  12.  31.

○ 토지 및 지장물 협의 매수	: 2018. 12.~2019. 10.

○ 중앙토지수용위원회 토지수용재결, 공탁 및 소유권이전 완료	: 2019.10.~2020. 3.

○ 중앙토지수용위원회 수용 이의재결 보상금 상승분 공탁	: 2020. 8. 7.

○ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2019. 11. ~ 2021. 12.

□ 향 후 계 획

○ 건축 및 토목 등 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2019. 11. ~ 2021. 12.

▸만경강문화관 전시물 설계·제작·설치 용역 포함

○ 시설물 인계·인수(익산지방국토관리청→익산시)	: 2022. 1. ~ 2.

○ 만경강문화관 관리·운영(익산시)	: 2022. 3. ~

8. 국가하천 유지관리사업

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 국가하천 (금강, 만경강, 강경천) : 34.2㎞

▸금강 21.26km, 만경강 10.4km, 강경천 2.54km

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 593백만원(국비 100%-금강 395백만원, 만경강 198백만원)

○ 사업내용 : 국가하천(금강, 만경강, 강경천) 유지관리

□ 추 진 실 적

○ 만경강 생태하천 정비사업

▸만경강 제방, 자전거도로 및 산책로 풀깍기 등

▸미끄럼방지포장, 노후차선도색, 제방도로 균열 보수공사 등 유지관리

○ 만경강 환경정비공사

▸인부/내용 : 만경강 인근지역 주민/풀깍기, 예초, 꽃길 조성지 관리 등

▸기간/인원 : 2020. 4. ~ 12.(7회) / 6~7여명(회당)

○ 금강 생태하천 정비사업

▸금강 자전거도로 및 용안생태공원 산책로 풀깍기 등

▸용안생태습지 파고라, 퍼컬러지붕, 전망대데크 등 보수, 보행매트(야자매트) 설치

○ 금강 생태하천 환경정비공사

▸인부/내용 : 용안, 성당면 인근지역 주민/풀깍기, 예초, 꽃길 조성지 관리 등

▸기간/인원 : 2020. 4. ~ 12.(7회) / 12여명(회당)

□ 향 후 계 획

○ 2021년 국가하천(금강, 만경강) 정비사업 추진	: 2021. 3. ~ 12.

▸만경강 제방, 자전거도로 미끄럼방지포장, 산책로 등 풀깍기 등

▸용안생태습지 자전거도로 및 산책로 풀깍기, 홍련지데크 재정비, 산책로 정비 등

○ 2021년 (금강, 만경강) 환경정비사업 추진	: 2021. 3. ~ 11.

▸풀깍기, 화장실 등 친수시설 청소 및 관리, 초화류 식재 등

9. 하천제방 유지보수

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	하천관리계장		김 철	□

□ 사 업 개 요

○ 위    치 : 익산시 관내 지방하천 및 소하천 일원

○ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12.

○ 사 업 비 : 2,006백만원(시비)

○ 규    모 : 관내 지방하천 27개소(187km) 및 소하천 62개소(102.2km)

○ 주요내용 : 관내 지방하천 및 소하천 준설, 제방보수, 제초, 하천환경정비 등

□ 추 진 실 적

○ 기양천, 대조천, 익산천 등 준설공사 6건(하천준설 L=6,680m, V=37,4716㎡) 추진

○ 2020년 용동면 산북천, 강경천 제방포장공사(콘크리트포장 L=1,249m, B=4m) 추진

○ 삼기면 석축보수공사(석축쌓기 L=15m, H=3.4m) 추진

○ 탑천, 어량천 제방, 산북천제방, 죽청천, 석왕천, 강경천 등 풀깍기 공사 추진

○ 하천유지보수 단가계약 1차~8차(준설, 응급복구, 제초작업 등) 추진

□ 향 후 계 획

○ 2021년 하천제방 유지보수(자체) 사업 추진	: 2021. 1. ~ 12.

▸용안생태습지 관광활성화 조경사업(전망대데크 연결로 포장, 광장진입로포장)

▸왕궁면 쌍제천· 탑천 하천준설공사, 산북천 제방포장공사

▸금마면 황동천 제방보수, 갈전천·기양천 석축보수, 죽림1교 보수공사

▸하천 유지관리 단가계약(신문고, 시정에 바란다 등 민원처리사항)

10. 도로조명 조도개선

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

□ 사 업 개 요

○ 사업위치 : 익산시 일원

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 1,134백만원

○ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행 불편지역 도로조명 보수 및 설치

(단위 : 백만원)

구 분	세 부 사 업	사 업 개 요	예산액	비고
계		15개 사업	1,134
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등신규설치196개소	216
	왕궁유적전시관인근보안등설치	보안등신규설치10개소	10
	밝은마을만들기(가로등LED교체)사업	LED가로등교체1식	76	도 보조
노 후 가로등정비	도심지역가로등유지보수	고장가로등정비120개소	120
	산업단지가로등유지보수	가로등보수60개소	60
	가로등노후점멸기교체공사	노후점멸기교체5개소	22
	읍면지역보안등보수	읍면지역고장보안등수리	120
	동지역보안등보수	동지역고장보안등수리	78
	노후보안등기구교체	노후보안등기구교체	42
	전기안전점검부적합보수단가	점검부적합보수1식	30
	도심지역노후가로등교체공사	노후가로등정비1식	100
	노후가로등LED교체공사	LED등기구교체1식	100
	산업단지조도개선공사	램프(안정기)교체1식	90
	금마7공수~상제사거리노후가로등교체공사	노후가로등정비1식	40	3회 추경
	영등동가로환경가로등정비사업실시설계용역	실시설계용역1식	30	3회 추경

□ 추 진 실 적 : 1,127백만원 (집행율 99.3%)

○ 보안등 신규설치(271개소)	: 295백만원

○ 노후 가로등 유지보수단가 외 11개사업	: 832백만원

11. 도로조명 고장민원 처리내역

확인자	:	건설과장		이 용 재	□
작성자	:	가로등관리계장		이 원 재	□

□ 필  요  성

○ 도로조명 민원처리 기간을 단축하여 야간통행 불편을 해소하고 안전사고 발생을 최소화 하고자 함

□ 사 업 개 요

○ 2020년도 생활민원 처리 현황

(2020.12.31.현재)

구 분	설치수량	처리건수	평균처리일수	비고
계	30,082 등	7,292
가로등	10,573 등	1,903	3일
보안등	19,509 등	5,389	5일

□ 추 진 실 적

○ 신속한 민원처리를 위해 현장팀의 다변화	시행 : 2020. 1. ~ 12.

▸읍‧면지역, 동지역, 산업단지 등 지역별 구분하여 보수단가업체 관리

▸가로등관리 자체인력 및 장비를 통한 민원 즉각대응