2021. 5.

제235회 익산시의회 (제1차 정례회)

2021 행정사무감사자료

	미래농정국

농산유통과

	□		감사자료 공통사항
			1.	2020년도 업무성과 및 반성 …………………	183
			2.	2020년도 예산집행 및 추진사항 ……………	184
			3.	2020년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	189
			4.	2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과 …	191
			5.	5분 자유발언 조치 결과 ……………………	191
			6.	시정질문에 대한 조치 결과 …………………	192
			7.	의원발의 조례 제·개정 후 추진현황 ………	192
			8.	주요사업 조서(3천만원 이상) ………………	193
			9.	2020년도 각종 민원(진정, 건의, 청원 등) 접수 처리내역 …	198
			10.	기금운용 관련 …………………………………	198
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 ………	199
			12.	용역사업 관련 …………………………………	201
			13.	인․허가 민원 관련 …………………………	202
			14.	각종 공사 설계변경 상황 ……………………	202
			15.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상) …………	203
			16.	민간에 대한 보조금 집행내역 ………………	204

				17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …	209
				18.	2020년도 명시 및 사고이월 사업비 집행내역 ………	211
				19.	2020년 예산 중 2021년 명시 및 사고이월 내역 ………	212
				20.	예산 이용, 전용 사항 및 예비비 집행현황 …	212
				21.	공사 준공기한 연장 내역 ……………………	213
				22.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	213
				23.	국․도비 반납현황 및 사유 …………………	214
				24.	2020년도 계획사업중 미착공사업 현황 ……	217
				25.	2020년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황 …	217
				26.	2020년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업현황 …	218
				27.	2020년도 예산편성후 전액 미집행 내역 …	218
				28.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황 …	219
				29.	소송사건 현황 …………………………………	219
				30.	시 홈페이지에 접수된 민원처리 현황 ……	220
				31.	시설·사무 민간위탁 현황 ……………………	223
				32.	의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과 ……	224
				33.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황 …	224
				34.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황 …	225
				35.	시 산하 재단 설립 현황 ……………………	225
				36.	업무협약(MOU) 등 체결 현황 ………………	225

	□		농산유통과 요구사항
				1.	익산시 푸드플랜(먹거리전략) 구축	229
				2.	농산물 산지유통 활성화 지원	230
				3.	로컬푸드 활성화 추진	231
				4.	친환경 안전농산물 학교급식지원	232
				5.	전북쌀 Rice-up 프로젝트	233
				6.	기본형 공익직불제 사업	234
				7.	고품질쌀 유통활성화(벼 건조저장시설)	235
				8.	탑마루 농산물 생산지원 및 품질강화	236
				9.	기업 맞춤형 익산쌀 생산 및 유통	237
				10.	농수산물 도매시장 시설관리 및 운영 활성화 ……	238

감사자료 공통사항

1. 2020년도 업무성과 및 반성

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

□ 성      과

◦ 유통경쟁력 강화를 위한 통합마케팅조직 활성화

‣ ‘20년 원예산업발전계획 및 산지유통조직 종합평가	: 최우수 선정

- 인센티브 : 무이자 운영자금 56억원 확보

‣ 전북도 통합마케팅 운영평가	:  우수조직 선정

- 인센티브 : 도비 50백만원 확보(통합마케팅농가 상품화 지원)

‣ 원예농산물 통합마케팅 매출액 증가(‘19년 350억 → ‘20년 380억)

◦ 지속가능한 지역 먹거리 선순환 체계 구축

‣ 익산시 푸드플랜(먹거리전략) 수립 : 6대전략 10대 정책과제 설정

‣ (재)익산푸드통합지원센터 설립 타당성 검토 완료 및 조례 제정  : ‘20.11.

‣ 로컬푸드 직매장 운영 : 4개소, 매출 10,349백만원(이용객 50만명)

‣ 학생 가정 농산물 꾸러미 공급 : 2회, 유치원, 초중고 33,479명, 2,147백만원

◦ 기업 맞춤형 쌀 생산 유통으로 익산 쌀 소비 촉진

‣ CJ 햇반 원료곡 공급물량 확대 : ‘19년 12,000톤 → ‘20년 13,500톤

‣ 탑마루 쌀 생산단지 조성으로 기업체 등 원활한 공급 추진

- 탑마루 쌀 생산단지 조성 : 650ha(고품질 425ha, 친환경 225ha)

‣ 향토기업 하림의 즉석밥 생산단지 조성 : 350ha(원료곡 2,700톤 공급계약)

◦ 고품질 쌀 생산기반 조성 및 농가 소득 보전

‣ 기본형 공익직불금 등 지급 : 총49,920백만원(국비38,361, 도비1,601, 시비9,958)

‣ 고품질쌀 유통활성화사업(벼 건조저장시설) : 1개소(익산통합) / 744백만원

‣ 전북쌀 Rice-up프로젝트지원사업 : 1개소(중신RPC) / 195백만원

□ 반      성

◦ 학생 가정내 농산물 꾸러미 품질관련 민원 발생

‣ 공급업체에 대한 제품검수 및 보관, 위생 상태 등 현장점검 강화 추진

2. 2020년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

▣ 일반회계

【 2020. 12. 31 】

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액				지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2020 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액
농 산 유 통 과				71,823,563	67,899,577	3,923,986	0	67,500,581	2,889,790	592,870	840,322	94.0
	고품질농산물 생산,유통 강화			57,341,987	56,455,801	886,186	0	56,501,862	470,000	122,938	247,187	98.5
		농산물 유통 현대화		3,980,406	3,175,406	805,000	0	3,667,041	0	117,511	195,854	92.1
			농산물유통 지원	37,000	37,000			35,916			1,084	97.1
			장점마을 농산물 수매 (환경오염종합대책)	200,000		200,000		65,241		67,380	67,379	32.6	참고1
			익산보리쌀 포장재지원	8,000	8,000			8,000				100.0
			APC공동선별장 물류비 지원	20,000	20,000			20,000				100.0
			소규모 농산물 저온장고 지원	108,000	108,000			108,000				100.0
			신선농산물 수출물류비 지원	266,667	266,667			104,670		48,599	113,398	39.3	참고2
			생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화	160,000	160,000			160,000				100.0
			우수농산물 물류비지원	40,000	40,000			40,000				100.0
			농특산물 인터넷판매 활성화사업	24,000	24,000			20,169		1,532	2,299	84.0
			공동선별비 (농산물공동출하확대지원)	190,920	190,920			190,920				100.0
			농산물 마케팅 지원	32,856	32,856			32,856				100.0
			농산물공동작업 지원체계확충	213,468	213,468			213,468				100.0
			저온유통체계구축 (산지저온시설)	514,000		514,000		514,000				100.0
			여산휴게소 로컬푸드 행복장터 개보수	10,000	10,000			9,000			1,000	90.0
			소규모농가 농산물 순회수집 체계	10,000	10,000			10,000				100.0
			농산물 TV홈쇼핑 지원	12,000	12,000			12,000				100.0
			주요농산물 가격안정지원사업	17,455	17,455			6,801			10,654	39.0	참고3
			탑마루쇼핑몰 택배비지원	20,000	20,000			20,000				100.0
			익산시푸드플랜 수립연구용역	91,000		91,000		91,000				100.0
			푸드플랜 활성화추진	2,000	2,000			1,960			40	98.0
			딸기 통합마케팅 활성화지원	7,000	7,000			7,000				100.0
			′20년 농산물산지유통센터 (APC)건립지원	1,980,000	1,980,000			1,980,000				100.0
			농업인 다중방문 사업장 방역용품 공급사업	6,040	6,040			6,040				100.0
			국산식재료 공동구매 조직화사업	10,000	10,000			10,000				100.0
		쌀 유통기반조성		51,112,868	51,112,868	0	0	51,065,235	0	5,427	42,206	99.9
			정부양곡관리비 (지자체)지원	8,247	8,247			8,162		85		99.0
			양곡관리 업무추진	500	500			500				100.0
			벼·보리 공시료 채취	2,122	2,122			1,910			212	90.0
			공익기능 증진 직접지불제 행정경비	100,000	100,000			95,911		4,089		95.9
			논농업환경 보전지원사업(자체)	10,000,000	10,000,000			9,958,171			41,829	99.6
			기본형공익직불금	38,361,700	38,361,700			38,361,379		321		99.9
			벼톤백지원사업	100,000	100,000			100,000				100.0
			전북쌀 Rice-up 프로젝트 지원사업	195,000	195,000			194,285		550	165	99.6
			고품질쌀 유통활성화사업	744,000	744,000			744,000				100.0
			논농업환경 보전지원사업(도비)	1,601,299	1,601,299			1,600,917		382		99.9
		브랜드 개발 지원		1,523,735	1,498,735	25,000	0	1,502,737	20,000	0	998	98.6
			브랜드 개발 지원 (인건비 등)	27,960	27,960			27,883			77	99.7
			탑마루쌀 생산단지 수매보상	398,125	398,125			398,120			5	99.9
			CJ햇반 원료곡 생산단지 수매보상	446,250	446,250			446,236			14	99.9
			하림 즉석밥 원료곡 생산단지 수매보상	122,500	122,500			122,498			2	99.9
			익산쌀 제주지역 물류비지원	45,000	45,000			45,000				100.0
			하림 즉석밥 원료곡 물류비지원	10,000	10,000			10,000				100.0
			탑마루 원예농산물(상추) 생산농가지원	24,850	24,850			24,850				100.0
			탑마루 공동브랜드 포장재제작지원	60,000	60,000			60,000				100.0
			탑마루 고구마 생산농가지원	65,000	40,000	25,000		45,000	20,000			69.2	21명시 참고4
			탑마루 쌀 생산단지 조성사업	65,000	65,000			64,100			900	98.6
			CJ햇반 원료곡 생산단지 조성사업	170,000	170,000			170,000				100.0
			탑마루 주력품목 (양파)종자대지원	40,000	40,000			40,000				100.0
			하림즉석밥 원료곡 생산단지 조성사업	35,000	35,000			35,000				100.0
			하림즉석밥 원료곡 톤백 지원	8,000	8,000			8,000				100.0
			하림즉석밥 원료곡 팔레트 지원	6,050	6,050			6,050				100.0
		도매시장환경개선		724,978	668,792	56,186	0	266,849	450,000	0	8,129	36.8
			관리시설정비(운영비)	135,542	135,542			135,182			360	99.7
			도매시장 저온저장고 신축공사	450,000	450,000			0	450,000			0.0	21명시 참고5
			도매시장 채소동 야적창고 신축공사	30,000	30,000			26,053			3,947	86.8
			도매시장 화장실보수공사	104,186	48,000	56,186		100,652			3,534	96.6
			관리시설정비(자산취득)	5,250	5,250			4,962			288	94.5
	지역농업활성화			3,681,565	643,765	3,037,800	0	1,259,261	2,419,790	1,614	900	34.2
		로컬푸드활성화		3,625,885	588,085	3,037,800	0	1,203,581	2,419,790	1,614	900	33.2
			로컬푸드육성지원사업	2,720	2,720			2,327			393	85.6
			로컬푸드직매장운영	1,560	1,560			1,341			219	86.0
			로컬푸드 모니터링단 운영	16,000	16,000			16,000				100.0
			로컬푸드 농산물 택배비지원	15,000	15,000			15,000				100.0
			로컬푸드 직매장 소포장재지원	30,000	30,000			30,000				100.0
			중소농농산물 안전유통지원	27,805	27,805			27,805				100.0
			로컬푸드직매장 생산소비교류활동지원	10,000	10,000			10,000				100.0
			서부권 로컬푸드직매장 농가조직화	5,000	5,000			5,000				100.0
			서부권 로컬푸드 직매장 신축	3,480,000	480,000	3,000,000		1,060,210	2,419,790			30.5	명시/사고 참고6
			로컬푸드 소규모비닐하우스지원	37,800		37,800		35,898		1,614	288	95.0
		농산물유통지원		55,680	55,680	0	0	55,680	0	0	0	100.0
			친환경농산물 유통소비 마케팅지원	55,680	55,680			55,680				100.0
	유아·초중등 교육복지 실현			10,629,582	10,629,582	0	0	9,569,682	0	468,318	591,582	90.0
		교육재정확충		10,629,582	10,629,582	0	0	9,569,682	0	468,318	591,582	90.0
			친환경쌀 어린이 급식지원	36,300	36,300			32,757		1,063	2,480	90.2
			도농상생 공공급식 안전성검사비 지원	16,900	16,900			0		5,070	11,830	0.0	참고7
			학교무상급식지원	8,057,312	8,057,312			7,419,087		299,628	338,597	92.1
			친환경농산물 학교급식지원(도)	1,215,821	1,215,821			948,779		125,676	141,366	78.0
			학교급식지원센터운영	39,000	39,000			37,800			1,200	96.9
			학교급식통합관리 시스템사용료지원	5,000	5,000			5,000				100.0
			학교급식배송자재지원	10,000	10,000			10,000				100.0
			학교급식 친환경농산물 생산농가지원	37,000	37,000			32,971			4,029	89.1
			어린이친환경 농산물급식지원	75,000	75,000			75,000				100.0
			친환경농산물 학교급식지원(자체)	838,000	838,000			831,975			6,025	99.3
			코로나19 피해 학교급식용 친환경농산물 지원사업	299,249	299,249			176,313		36,881	86,055	58.9	참고8
	재무활동(농산유통과)			137,063	137,063	0	0	137,054	0	0	9	99.9
		보전지출		137,063	137,063	0	0	137,054	0	0	9	99.9
			보전지출	137,063	137,063			137,054			9	99.9
	행정운영경비			33,366	33,366	0	0	32,722	0	0	644	98.1
		기본경비		33,366	33,366	0	0	32,722	0	0	644	98.1
			기본경비	33,366	33,366			32,722			644	98.1

(참고) 2020년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부 진 사 유
1	장점마을 농산물 수매 (환경오염종합대책)	200,000	65,241	32.6	‧ 수매 예상량 대비 실질 수매량이 적어 집행잔액 발생
2	신선농산물 수출물류비 지원	266,667	104,670	39.3	‧ 코로나 19로 신선농산물 수출량 감소 (‘19년 1,260톤 → ‘20년 837톤 ) ‧ 하반기 멜론 작황부진으로 수출 감소
3	주요농산물 가격안정지원사업	17,455	6,801	39.0	‧ 변경내시 미반영에 따른 집행잔액 발생
4	탑마루 고구마 생산농가 지원	65,000	45,000	69.2	‧ ‘21 명시이월 ‧ 고구마 무병 조직배양 및 증식 기간 1년이상 소요됨
5	도매시장 저온저장고 신축공사	450,000	0	0	‧ ‘21 명시이월 ‧ 설계용역 중간 검토 결과 연약 지반 보강, 전기설비 증설 등에 따른 사업 비 부족으로 추가예산 확보후 추진
6	서부권로컬푸드 직매장 신축	3,480,000	1,060,210	30.5	‧ ‘21 명시/사고 이월 ‧ 예산확보 지연(‘20. 결산추경) 및 행정 절차 이행으로 인한 공사착공 지연
7	도농상생 공공급식 안전성검사비 지원	16,900	0	0	‧ 서울자치구 매칭 지연으로 사업추진 불가
8	코로나19 피해 학교급식용 친환경농산물 지원사업	299,249	176,313	58.9	‧ 타시군에 납품한 농가 대부분 해당시군 급식센터와 공급계약이 안되어 있어 신청자격 미달

3. 2020년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•‘19년도 업무성과 및 반성 ‣업무 성과 부분만 작성하지 말고 반성도 같이 작성	‣‘19년도 완료하지 못하고, 이월된 사업이 많았음을 반성하며, 앞으로는 업무성과 및 반성을 같이 작성토록 하겠음
2	•농특산물 인터넷판매 사업 일원화 ‣농산유통과 농특산물 인터넷판매 사업과 농촌활력과 전자상거래 업무 일원화 필요	‣농특산물 인터넷 판매사업은 전라북도에서 운영하는 농특산물 판매사이트「거시기장터」 입점업체에 택배 비를 지원하는 사업으로, 마을공동체 소득창출 목적인 농촌활력과 전자상거래 사업과 목적이 달라 일원화는 어려우나, 사업연계가 가능한 부분은 검토하겠음
3	•익산역내 지역농특산물 홍보 ‣유동 인구수가 많은 익산역 내 지역 생산 주력품목 위주의 농 산물 홍보 및 전시 필요	‣익산역내 전라북도 농특산물 전시 판매장을 통해 지역산 농특산물을 일부 판매하고 있으며, 지역 생산 품목이 확대 될 수 있도록 하겠음 ※ 지역 농특산물 판매 : 21개업체 120개품목
4	•로컬푸드 소비자 ･ 생산자 만남 휴게소 사업목적 맞는 운영 ‣로컬푸드 농산물을 활용한 카페 운영목적으로 추진된 사업이니 계획에 맞는 운영 필요	‣ 익산로컬푸드 직매장 소비자 만남 카페는 소비자가 직매장내 베이커리, 떡, 식혜 등 식품을 구입 후 먹을수 있는 소비자 휴식장소로 이용중이며, 지역농산물을 사용한 소비자 체험활동 공간(김치담그기, 떡케이크 체험 등)으로 활용하고 있음

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
5	•대형마트내 지역농산물 판로확대 ‣대형마트내 지역산 농산물 공급이 확대 될 수 있도록 검토바람	▸현재 홈플러스 및 롯데슈퍼, 하나로마트 등 농산물이 공급되고 있으며 ▸지속적으로 대형유통업체와 협의를 통해 지역 농산물을 4,500톤 79억원(‘20년) 공급하였음
6	•위원회 회의록 상세작성 ‣홈페이지 공개 회의록 작성 시 일시, 장소, 발언 내용 등 회의내용 상세 및 회의록 양식 통일	‣위원회 회의록 작성시 통일된 양식으로, 상세하게 작성토록 하겠음
7	•학교급식 안전성 검사 철저 ▸학교급식 공급용 농산물에 대하여 안전성 철저요함	▸학교급식으로 공급되고 있는 친환경 농산물의 안전성 확보를 위하여 연 270여건 안전성 검사를 실시하고 있으며, 지속적으로 관리 하겠음
8	•국도비 반납관련 ▸국도비 반납예산이 많이 발생하고 있어 반납 최소화 할 수 있는 대책 강구 바람	▸국도비 사업의 추진상황을 수시 점검하여 반납예산이 최소화 될수 있도록 업무추진에 만전을 기하겠음
9	•예산 이월관련 ▸사업비 명시이월 예산 과다 발생, 예산의 효율적 사용을 위한 이월 최소화 노력	▸사업비 편성 시 면밀한 검토로 적정예산을 편성하여, 효율적 사용을 통한 이월액 발생이 최소화되도록 노력하겠음
10	•식품업무 분장관련 ▸국가식품클러스터담당관의 부서목적은 국가식품클러스터 산업단지 지원･육성에 있으며 익산시 식품업무 전반 담당은 적절하지 않다고 보여짐	▸농식품산업 육성 및 지원업무는 ‘20.1월 조직개편에 따라 국가 식품클러스터 담당관으로 이관되었음 ▸기업간 연계를 통해 농산물 공급이 확대 될 수 있도록 관련 부서와 협업 하겠음

4. 2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□

발언 의원 / 발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
조규대 (제231회)
		▸‘20년산 공공비축미곡 매입가격은 벼 1등급 기준 40kg 포대당 75,140원으로 작년 매입가격에 (65,750/40kg) 비해 14.3% 높은 수준으로 책정 ▸‘20년은 기상이변에 따른 쌀 생산량 감소로 농업인의 어려움이 컸지만, 쌀값이 216,848원/80kg (‘19년산 189,964원/80kg)으로 증가해 농가의 소득 안정에 기여
	∙태풍 등으로 올해 벼 수확량이 감소하여 우리시 농가소득 저하 예상 ∙이에 대한 대책으로 공공비축미 매입단가 현실방안 중앙부처 적극 건의 필요

6. 시정 질문에 대한 조치결과

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

7. 의원발의 조례 제･개정 후 추진현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

8. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로 컬 푸 드 계장		임 용 찬	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	사 업 비	진도 (%)	비 고
계(44건 )		83,167,189 ∘국비 3,139,888 ∘기금 38,361,700 ∘도비 7,343,311 ∘시비 22,147,234 ∘교특 8,629,464 ∘자담 3,545,592
장점마을 농산물 수매 (환경오염종합대책) (명시이월)	8개농가 2.5톤	200,000 ∘도비 100,000 ∘시비 100,000	32.6
소규모농산물 저온저장고지원	36동 (10m[eqn: {}^{eqalign{2# }}]/동)	216,000 ∘시비 108,000 ∘자담 108,000	100
신선농산물 수출물류비 지원	15개소	266,667 ∘도비 80,000 ∘시비 186,667	39.3
생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화지원	7개소	200,000 ∘도비 100,000 ∘시비 60,000 ∘자담 40,000	100
우수농산물 물류비지원	634톤	57,000 ∘시비 40,000 ∘자담 17,000	100
공동선별비 (농산물공동출하확대지원)	2,498톤	405,840 ∘국비 95,460 ∘도비 28,638 ∘시비 66,822 ∘자담 214,920	100
농산물 마케팅 지원	39회	54,756 ∘국비 16,428 ∘도비 4,928 ∘시비 11,500 ∘자담 21,900	100
농산물공동작업 지원체계확충	5,968톤	355,780 ∘도비 177,890 ∘시비 35,578 ∘자담 142,312	100
원예농산물 저온유통체계구축 (산지저온시설) (명시이월)	1식	858,000 ∘국비 257,000 ∘도비 77,100 ∘시비 179,900 ∘자담 344,000	100
익산시푸드플랜 수립연구용역 (명시이월)	1식	91,000 ∘국비 25,000 ∘시비 66,000	100
농산물산지유통센터(APC)건립지원	1식	3,300,000 ∘국비 1,650,000 ∘도비 165,000 ∘시비 165,000 ∘자담 1,320,000	100
논농업환경보전지원사업 (자체)	11,704농가 15,020ha	10,000,000 ∘시비 10,000,000	99.6
기본형공익직불금	13,762농가 18,610ha	38,361,700 ∘기금 38,361,700	99.9
벼톤백지원사업	4,666농가 25,000매	200,000 ∘시비 100,000 ∘자담 100,000	100
전북쌀 Rice-up 프로젝트 지원사업	1개소	300,000 ∘도비 150,000 ∘시비 45,000 ∘자담 105,000	99.6
고품질쌀 유통활성화사업 (벼건조저장시설)	1개소	1,240,000 ∘국비 496,000 ∘도비 74,400 ∘시비 173,600 ∘자담 496,000	100
논농업환경보전지원사업 (도비)	11,329농가 12,562ha	1,601,299 ∘도비 1,601,299	99.9
탑마루쌀생산단지 수매보상	다망단지 외 26개 단지	398,125 ∘시비 398,125	99.9
CJ햇반 원료곡 생산단지 수매보상	고창단지 외 21개 단지	446,250 ∘시비 446,250	99.9
하림 즉석밥 원료곡 생산단지 수매보상	덕용단지 외 9개 단지	122,500 ∘시비 122,500	99.9
익산쌀제주지역 물류비지원	2개소	90,082 ∘시비 45,000 ∘자담 45,082	100
탑마루 공동브랜드 포장재 제작지원	4개소	120,006 ∘시비 60,000 ∘자담 60,006	100
탑마루 고구마 생산농가 지원	4개소	81,900 ∘시비 40,000 ∘자담 41,900	50	‘21 명시
탑마루 고구마 생산농가 지원 (명시이월)	2개소	50,000 ∘시비 25,000 ∘자담 25,000	100
탑마루 쌀 생산단지 조성사업	650ha	143,330 ∘시비 65,000 ∘자담 78,330	98.6
CJ햇반 원료곡 생산단지 조성사업	1,700ha	375,902 ∘시비 170,000 ∘자담 205,902	100
탑마루주력품목 (양파)종자대 지원	1개소	87,390 ∘시비 40,000 ∘자담 47,390	100
하림즉석밥 원료곡 생산단지 조성사업	350ha	73,630 ∘시비 35,000 ∘자담 38,630	100
도매시장 저온저장고 신축공사	1동 (330㎡)	450,000 ∘시비 450,000	0	‘21 명시
도매시장 채소동 야적창고 신축공사	1동 (104㎡)	30,000 ∘시비 30,000	86.8
도매시장 야외 화장실 보수공사	3개소(128㎡)	48,000 ∘시비 48,000	98.6
도매시장내 화장실 보수공사 (명시이월)	2개소(140㎡)	56,186 ∘시비 56,186	94.9
로컬푸드 직매장 소포장재지원	4개소	50,000 ∘시비 30,000 ∘자담 20,000	100
서부권로컬푸드 직매장 신축	1개소	480,000 ∘시비 480,000	0	‘21 명시
서부권로컬푸드 직매장 신축 (명시이월)	1개소	3,000,000 ∘국비 600,000 ∘도비 270,000 ∘시비 2,130,000	35.3	‘21 사고
로컬푸드 소규모 비닐하우스지원 (명시이월)	9개동	63,000 ∘도비 31,500 ∘시비 6,300 ∘자담 25,200	95
친환경농산물 유통소비 마케팅지원	3개소	69,600 ∘도비 16,480 ∘시비 39,200 ∘자담 13,920	100
친환경쌀 어린이 급식지원	69개소 3,545명	36,300 ∘도비 10,890 ∘시비 25,410	90.2
학교무상급식지원 (초,중,고등학교)	104개교 28,545명	16,114,624 ∘도비 3,793,259 ∘시비 4,264,053 ∘교특 8,057,312	92.1
친환경농산물 학교급식지원(도)	157개교 32,747명	1,787,973 ∘도비 572,152 ∘시비 643,669 ∘교특 572,152	78
학교급식 친환경농산물 생산농가지원	39농가	74,000 ∘시비 37,000 ∘자담 37,000	89.1
어린이친환경농산물 급식지원	154개소 7,017명	75,000 ∘시비 75,000	100
친환경농산물 학교급식지원(자체)	157개교 32,747명	838,000 ∘시비 838,000	99.3
코로나19피해 학교급식용 친환경농산물 지원사업	24개소	299,249 ∘도비 89,775 ∘시비 209,474	58.9

9. 2020년도 각종 민원 접수 처리내역

(진정, 건의, 청원 등)

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□

▣ 민원 접수처리 현황

(단위 : 건수)

합 계	진 정	질 의	요 청	탄 원	건 의
1					1

▣ 민원 접수처리 내역

종류	건 명	민원인	요 구 내 용	처 리 내 용
국 민 신문고	학교급식 꾸러미 품질 상태 불량	장*남
			•학생 가정내 농산물 꾸러미로 공급받은 농산물이 일부 상했거나 품질 상태가 불량임	‣품질상태가 좋지 못한 농산물은 학교급식지원센터를 통해 교환해 드림 ‣향후 동일 문제가 재발되지 않도록 공급업체에 대한 지도 점검을 강화하겠음

10. 기금운용 관련

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

▣ 위원회 설치현황

위원회명	설 치 근 거	구성원수	심의․의결․자문 기 능 여 부	비고
로컬푸드 육성·지원 위원회	익산시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한조례 제6조	11명	여
학교급식지원 심의위원회	익산시 학교급식비 지원조례 제9조	15명	여
학교급식지원센터 운영위원회	익산시 학교급식비 지원조례 제17조	10명	여
공동상표 심의위원회	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제3조	14명	여
시장관리운영 위원회	익산시 농수산물 도매시장 운영관리조례 제94조	11명	여
도매시장거래 분쟁조정위원회	익산시 농수산물 도매시장 운영관리조례 제95조	6명	여

▣ 각종위원회의 운영예산

위원회명	운영횟수	위원수당 지급내역		비 고
		수 당	금액(천원)
학교급식지원 심의위원회	1회	7만원 / 10명	700
학교급식지원센터 운영위원회	10회	7만원 / 7명내외	5,040
시장관리 운영위원회	1회	7만원 / 9명	630

▣ 회의록 공개일자

위원회명	회의 구분	회의일자	공개일자	공개방법	미공개사유	비고
학교급식지원 심의위원회	대면	2020.10.28.	2020.10.30.	시 홈페이지	-
학교급식지원센터 운영위원회	대면	2020.01.16.	2020.01.17.	시 홈페이지	-
	대면	2020.02.05.	2020.02.06.	시 홈페이지	-
	대면	2020.04.10.	2020.04.20.	시 홈페이지	-
	대면	2020.06.05.	2020.06.13.	시 홈페이지	-
	대면	2020.07.06.	2020.07.07.	시 홈페이지	-
	대면	2020.07.31.	2020.08.06.	시 홈페이지	-
	대면	2020.09.04.	2020.09.07.	시 홈페이지	-
	대면	2020.10.08.	2020.10.12.	시 홈페이지	-
	대면	2020.11.06.	2020.11.10.	시 홈페이지	-
	대면	2020.12.11.	2020.12.14.	시 홈페이지	-
공동상표 심의위원회	서면	2020.09.01.	-	-	회의록없음
시장관리운영 위원회	대면	2020.10.15.	2020.10.16.	시 홈페이지	-

▣ 각종 위원회에서 심의하여 단체장의 의견이 수정된 사례

해    당    없    음

▣ 단체장이나 부단체장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회

위원회명	위원장	비 고
로컬푸드 육성·지원 위원회	부시장
학교급식지원 심의위원회	부시장

12. 용역사업 관련

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□

(단위 : 천원)

용역명	용역업체	용역비	계약방법	비고
계(1건)		91,000
익산시푸드플랜 수립연구용역 (명시이월)	지역농업네트워크 호남협동조합	91,000	협상	연구 용역

13. 인․허가 민원현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

▣ 각종 민원서류 보완요구 및 반려 현황

해    당    없    음

▣ 각종민원서류 처리중 법령기간을 초과하여 처리해준 건수 및 사유

해    당    없    음

▣ 민원처리업무의 감사실적 및 결과

해    당    없    음

▣ 불허 취하 민원 현황

해    당    없    음

14. 각종공사 설계변경 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

15. 건설공사 집행현황 (3천만원 이상)

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

(단위:천원)

사 업 명	사업 개요	계약자	사업비 (집행액)	공사기간	추진 상황
계(4건)			3,614,186 (1,186,915)
서부권 로컬푸드 직매장 신축 (명시포함)	로컬푸드 직매장, 회의실, 로컬 레스토랑(카페) 등	(유)제인건설	3,480,000 (1,060,210)	‘20. 10. 21. ~ ‘21. 08. 20.	공사 착공
도매시장 채소동 야적창고 신축공사	야적창고 1동 (104㎡, 파이프 천막구조)	(유)세진 종합공사	30,000 (26,053)	‘20. 12.03. ~ ‘20. 12. 23	완료
도매시장 야외 화장실보수공사	야외화장실 3개소(128㎡) 리모델링 및 위생도기 교체	(유)연정 조경건설	48,000 (47,351)	‘20. 7. 2. ~ ‘20. 8. 3.	완료
도매시장내 화장실 보수공사 (명시이월)	내부 화장실 2개소(140㎡) 리모델링 및 위생도기 교체	(유)한국 페이버	56,186 (53,301)	‘20. 7. 1. ~ ‘20. 7. 30.	완료

16. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□

사 업 명	사 업 량	집 행 액	보조근거	지급기준	비고
계(54건 )		56,485,195
장점마을 농산물수매 (환경오염종합대책) (명시이월)	8개농가 2.5톤	65,241	환경보건법 제20조	도비 50% 시비 50%
익산보리쌀 포장재지원	133,800매	8,000	농수산물 품질관리법 제110조	시비 50% 자담 50%
APC 공동선별장 물류비 지원	1,992톤	20,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제43조	시비 50% 자담 50%
소규모 농산물 저온저장고 지원	36동	108,000	농수산물 품질관리법 제110조	시비 50% 자담 50%
신선농산물 수출물류비지원	15개소	104,670	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제59조	도비 30% 시비 70%
생산자조직화 및 통합마케팅 활성화지원	7개소	160,000	전라북도 통합마케팅 전문조직 육성 및 활성화 지원조례 제12조	도비 50% 시비 30% 자담 20%
우수농산물 물류비 지원	634톤	40,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제43조	시비 70% 자담 30%
농특산물인터넷 판매활성화	10개소	20,169	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제43조	도비 40% 시비 60%
공동선별비 (농산물공동출하확대지원)	2,498톤	190,920	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제43조	국비 25% 도비 7.5% 시비17.5% 자담 50%
농산물 마케팅 지원	39회	32,856	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제43조	국비 30% 도비 9% 시비 21% 자담 40%
농산물공동작업 지원체계 확충	5,968톤	213,468	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제8조 및 제11조	균특 50% 시비 10% 자담 40%
원예농산물 저온유통체계구축 (산지저온시설) (명시이월)	1식	514,000	농수산물 유통 및 가격 안정에 관한 법률 제57조	국비 30% 도비 9% 시비 21% 자담 40%
소규모농가 농산물 순회수집 체계	15개소	10,000	익산시 농산물 통합마케팅 전문조직육성 및 활성화 지원조례 제12조	시비 50% 자담 50%
농산물 TV홈쇼핑 지원사업	1개소	12,000	지역농산물 이용촉진등 농산물직거래활성화에 관한법률 제15조	도비 20% 시비 40% 자담 40%
주요농산물 가격안정지원사업	7명	6,801	전라북도 통합마케팅 전문조직 육성 및 활성화 지원조례 제12조	도비 30% 시비 70%
탑마루 쇼핑몰 택배비 지원	14,250건	20,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제43조	시비 100%
딸기통합마케팅 활성화지원	35회	7,000	익산시 농산물 통합마케팅 전문조직육성 및 활성화 지원조례 제11조	시비 50% 자담 50%
농산물산지유통센터(APC)건립지원	1식	1,980,000	농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 제51조 및 제57조	국비 50% 도비 5% 시비 5% 자담 40%
농업인다중방문사업장 방역용품공급지원	8개소	6,040	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제7조 및 제8조	도비 50% 시비 50%
국산식재료 공동구매조직화사업	1개소	10,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제21조	국비 50% 시비 50%
논농업환경보전지원사업 (자체)	11,704농가 15,020ha	9,958,171	농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제10조 및 제11조	시비 100%
기본형공익직불금	13,762농가 18,610ha	38,361,379	농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제10조 및 제11조	국비 100%
벼톤백지원사업	4,666농가 25,000매	100,000	농업·농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
전북쌀 Rice-up 프로젝트 지원사업	1개소	194,285	농업·농촌 및 식품산업 기본법 제7조	도비 50% 시비 15% 자담 35%
고품질쌀유통활성화 (벼건조저장시설)	1개소	744,000	양곡관리법 제22조	국비 30% 도비 6% 시비 14% 자담 50%
논농업환경보전지원사업 (도비)	11,329농가 12,562ha	1,600,917	농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제10조 및 제11조	도비 100%
탑마루 쌀 생산단지 수매보상	다망단지 외 26개 단지	398,120	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 100%
CJ햇반 원료곡 생산단지 수매보상	고창단지 외 21개 단지	446,236	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 100%
하림즉석밥 원료곡 생산단지 수매보상	덕용단지 외 9개 단지	122,498	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 100%
익산 쌀 제주지역 물류비지원	2개소	45,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
하림 즉석밥 원료곡 물류비 지원	3개소	10,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
탑마루 원예농산물(상추) 생산농가 지원	1개소	24,850	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 50% 자담 50%
탑마루 공동브랜드 포장재 제작지원	4개소	60,000	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 50% 자담 50%
탑마루 고구마 생산농가 지원	4개소	20,000	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 50% 자담 50%
탑마루 고구마 생산농가 지원 (명시이월)	2개소	25,000	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 50% 자담 50%
탑마루 쌀 생산단지 조성사업	650ha	64,100	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 50% 자담 50%
CJ햇반 원료곡 생산단지 조성사업	1,700ha	170,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
탑마루 주력품목 (양파) 종자대 지원	1개소	40,000	익산시 농특산물 공동상표 관리조례 제20조제3항	시비 50% 자담 50%
하림즉석밥 원료곡 생산단지 조성사업	350ha	35,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
하림즉석밥 원료곡 톤백 지원	3개소	8,000	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
하림즉석밥 원료곡 팔레트 지원	3개소	6,050	농업‧농촌 및 식품산업 기본법 제4조 및 제8조	시비 50% 자담 50%
로컬푸드 모니터링단 운영	1개소	16,000	익산시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제5조	시비 100%
로컬푸드 농산물택배비지원	1개소	15,000	익산시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제5조	시비 100%
로컬푸드직매장 소포장재지원	4개소	30,000	익산시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제5조	시비 60% 자담 40%
중소농농산물 안전유통지원사업	4개소	27,805	익산시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제5조	도비 30% 시비 42% 자담 28%
로컬푸드직매장 생산소비교류활동지원	1개소	10,000	전라북도 로컬푸드 육성 지원에 관한 조례 제6조	도비 50% 시비 50%
로컬푸드 소규모 비닐하우스지원 (명시이월)	9개동	35,898	전라북도 로컬푸드 육성 지원에 관한 조례 제6조	도비 50% 시비 10% 자담 40%
친환경농산물 유통소비 마케팅지원	3개소	55,680	전라북도 친환경농어업 육성조례 제5조	도비 24% 시비 56% 자담 20%
친환경쌀 어린이 급식지원	69개소 3,545명	32,757	전라북도 학교친환경 무상급식 지원에 관한조례 제4조	도비 30% 시비 70%
학교급식 통합관리 시스템 사용료지원	1식	5,000	익산시 학교급식비 지원조례 제16조	시비 50% 자담 50%
학교급식배송 자재지원	1식	10,000	익산시 학교급식비 지원조례 제16조	시비 50% 자담 50%
학교급식친환경농산물생산농가지원	39농가	32,971	익산시 친환경농업 육성지원조례 제7조	시비 50% 자담 50%
어린이친환경 농산물급식지원	154개소 7,017명	75,000	익산시 학교급식비 지원조례 제5조	시비 100%
코로나19피해 학교급식용 친환경농산물 지원사업	24개소	176,313	전라북도 친환경농어업 육성조례 제5조	도비 30% 시비 70%

(단위 : 천원)

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				지출액	이월액	잔 액	비고
	계	국 비	도 비	시 비
계(14건)	53,999,436	40,860,160	7,009,513	6,129,763	52,673,059	0	1,326,377
장점마을 농산물수매 (환경오염종합대책) (명시이월)	200,000	0	100,000	100,000	65,241	0	134,759	집행 잔액
신선농산물 수출물류비지원	266,667	0	80,000	186,667	104,670	0	161,997	집행 잔액
생산자조직화 및 통합마케팅활성화	160,000	0	100,000	60,000	160,000	0	0
공동선별비 (농산물공동출하확대)	190,920	95,460	28,638	66,822	190,920	0	0
농산물공동작업 지원체계확충	213,468	0	177,890	35,578	213,468	0	0
원예농산물 저온유통체계구축 (산지저온시설) (명시이월)	514,000	257,000	77,100	179,900	514,000	0	0
농산물산지유통센터(APC)건립지원	1,980,000	1,650,000	165,000	165,000	1,980,000	0	0
기본형공익직불금	38,361,700	38,361,700			38,361,379	0	321	집행 잔액
전북쌀Rice-up 프로젝트지원	195,000	0	150,000	45,000	194,285	0	715	집행 잔액
고품질쌀유통활성화 (벼건조저장시설)	744,000	496,000	74,400	173,600	744,000	0	0
논농업환경보전지원 (도비)	1,601,299		1,601,299		1,600,917	0	382	집행 잔액
학교무상급식지원	8,057,312		3,793,259	4,264,053	7,419,087	0	638,225	집행 잔액
친환경농산물 학교급식지원(도)	1,215,821		572,152	643,669	948,779	0	267,042	집행 잔액
코로나19피해 학교급식용 친환경 농산물 지원사업	299,249		89,775	209,474	176,313	0	122,936	집행 잔액

18. 2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

(단위 : 천원)

사 업 명	이 월 액	집 행 액	잔 액	비고
계(7건)	3,923,986	1,844,650	2,079,336
장점마을 농산물 수매 (농산물유통지원)	200,000	65,241	134,759	명시 (사업완료)
원예농산물 저온유통체계구축 (산지저온시설)	514,000	514,000	0	명시
익산시푸드플랜 수립용역	91,000	91,000	0	명시
탑마루 고구마 생산농가지원	25,000	25,000	0	명시
도매시장내 화장실보수	56,186	53,301	2,885	명시 (계약잔액)
서부권 로컬푸드직매장 신축	3,000,000	1,060,210	1,939,790	명시 (‘21 사고)
로컬푸드 소규모 비닐하우스지원	37,800	35,898	1,902	명시 (집행잔액)

19. 2020년 예산중 2021년 명시 및 사고이월 내역

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	이월액	비고
계(4건)	3,970,000	1,080,210	2,889,790
서부권 로컬푸드직매장 신축 (명시이월)	3,000,000	1,060,210	1,939,790	사고
서부권 로컬푸드직매장 신축	480,000	0	480,000	명시
탑마루 고구마 생산농가 지원	40,000	20,000	20,000	명시
도매시장 저온저장고 신축공사	450,000	0	450,000	명시

20. 예산 이용, 전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

21. 공사 준공기한 연장내역

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

22. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 반납한 예산현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임용찬	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	지출액	반 납 액				반납 사유
			계	국 비	도 비	시 비
계(1건)	16,900	0	16,900	0	5,070	11,830
도농상생 공공급식 안전성검사비 지원	16,900	0	16,900	0	5,070	11,830	서울자치구 미매칭으로 사업 미실시

23. 국․도비 반납현황 및 사유

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□

▣ 2020년도 반납건

(단위:천원)

사 업 명	예산액	지출액	반 납 액				반 납 사 유
			계	국 비	도 비	시 비
계(18건)	34,987,044	34,748,952	238,409	57,072	79,982	101,355
신선농산물 수출물류비	273,333	230,433	42,900	0	12,870	30,030	집행잔액
공동선별비 (농산물공동출하확대)	187,542	169,579	17,997	9,008	2,702	6,287	집행잔액 (이자포함)
농산물마케팅지원(이자)	30,978	30,978	7	5	2	0	이자
농산물TV 홈쇼핑지원사업(이자)	18,000	18,000	6	0	6	0	이자
농산물공동작업 지원체계 확충사업(이자)	191,316	191,316	58	58	0	0	이자
생산자조직화 및 통합마케팅활성화사업(이자)	240,000	240,000	48	48	0	0	이자
농특산물 인터넷판매 활성화지원(이자)	112,500	112,500	90	0	90	0	이자
2018년 RPC교육홍보 컨설팅지원사업(이자)	60,000	60,000	6	5	1	0	이자
고품질쌀 유통활성화사업(이자)	4,340,000	4,340,000	15	13	2	0	이자
2018년 라이스랩사업	200,000	170,658	29,391	14,720	0	14,671	집행잔액 (이자포함)
쌀소득보전고정직불금	17,987,431	17,954,216	33,215	33,215	0	0	집행잔액
논농업환경보전지원사업 (도비)	1,607,711	1,576,459	31,252	0	31,252	0	〃
2019년산 보리매입 차액보전사업	206,664	204,488	2,176	0	653	1,523	〃
로컬푸드생산소비 교류활동지원	20,000	11,471	8,529	0	4,264	4,265	〃
친환경농산물 유통소비 마케팅지원	70,000	50,679	19,325		5,804	13,521	집행잔액 (이자포함)
친환경쌀 어린이급식지원	18,541	16,235	2,306	0	692	1,614	집행잔액
학교무상급식지원	8,141,761	8,102,321	39,440	0	16,166	23,274	〃
친환경농산물 학교급식지원(도)	1,281,267	1,269,619	11,648	0	5,478	6,170	〃

▣ 2021년도 반납 예정건(2020년도 사업)

(단위:천원)

사 업 명	예산액	지출액	반 납 액				반 납 사 유
			계	국 비	도 비	시 비
계(14건)	50,420,295	49,063,568	1,356,727	4,495	588,375	686,201
장점마을 농산물 수매 (환경오염종합대책) (명시이월)	200,000	65,241	134,759	0	67,380	67,379	집행잔액
신선농산물 수출물류비	266,667	104,670	161,997	0	48,599	113,398	〃
농특산물 인터넷판매 활성화사업	24,000	20,169	3,831	0	1,532	2,299	〃
정부양곡관리비 (지자체)지원	8,247	8,162	85	85	0	0	〃
공익기능증진 직접지불제 행정경비	100,000	95,911	4,089	4,089	0	0	〃
기본형공익직불금	38,361,700	38,361,379	321	321	0	0	〃
전북쌀 Rice-up 프로젝트 지원사업	195,000	194,285	715	0	550	165	〃
논농업환경보전지원사업 (도비)	1,601,299	1,600,917	382	0	382	0	〃
로컬푸드 소규모 비닐하우스지원 (명시이월)	37,800	35,898	1,902	0	1,614	288	〃
친환경쌀 어린이급식지원	36,300	32,757	3,543	0	1,063	2,480	〃
도농상생 공공급식 안전성검사비 지원	16,900	0	16,900	0	5,070	11,830	서울시 자치구 미매칭으로 사업 미실시
학교무상급식지원	8,057,312	7,419,087	638,225	0	299,628	338,597	집행잔액
친환경농산물 학교급식지원(도)	1,215,821	948,779	267,042	0	125,676	141,366	〃
코로나19피해 학교급식용 친환경농산물 지원사업	299,249	176,313	122,936	0	36,881	86,055	〃

24. 2020년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

(단위:천원)

사 업 명	사업량	사 업 비 내 역					비율 (%)	비 고
		계	국 비	도 비	시 비	자 담
계(1건)		450,000	0	0	450,000	0	0%
도매시장 저온저장고 신축공사	1동 (330㎡)	450,000	0	0	450,000	0	0%	∘지반조사 실시결과 연약지반으로 파일기초 공사 비용 증액 (220백만원 증액필요) ∘전선 허용전류초과로 전기공사 추가로 부족 사업비 추경 반영 후 추진 (60백만원 증액필요) ∘‘21년 명시이월

25. 2020년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

26. 2020년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

27. 2020년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

(단위:천원)

사 업 명	사업량	사 업 비 내 역					비 고
		계	국 비	도 비	시 비	자 담
계(3건)		946,900	0	5,070	941,830	0
도매시장 저온저장고 신축공사	1동	450,000	0	0	450,000	0	‘21명시
서부권 로컬푸드 직매장 신축	1개소	480,000			480,000		‘21명시 (4회추경 반영사업)
도농상생 공공급식 안전성검사비 지원	1식	16,900	0	5,070	11,830	0	서울자치구 미매칭으로 사업 미실시

28. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□

(단위:천원)

연번	세부사업	통계목	당초 예산액	변경액		집행액	변경 사유	비고
				감	증
1	보전지출	국고보조금반환금	61,340	4,265	-	57,072	‘로컬푸드 생산소비 교류활동지원사업’ 통계목 변경 집행 (국고→시도비)
		시도비보조금반환금	75,723	-	4,265	79,982

29. 소송 사건 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유 통 계 장		김 영 식	□

해    당    없    음

30. 시 홈페이지에 접수된 민원처리 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□
작성자	:	탑마루계장		강용석	□

▣ 민원 접수처리 내역

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
시정에바란다	탑마루 신동진벼 면적 확대 건의	윤*중
			•CJ그룹 보람찬 벼, 하림 새일미 면적이 부족하면 탑마루 신동진벼 면적을 확대하는 방향으로 익산시에서 노력요구	▸탑마루 신동진벼 면적 확대는 수매 경영체(RPC)별 탑마루 신동진 벼 수매량 대비 판매실적을 감안하여 신중히 고려해야 할 것으로 판단되고 탑마루 쌀 경영체와 협력하여 확대될 수 있도록 노력하겠음
시정에바란다	익산빵 개발 건의	김*욱	•경주빵이나 진주빵처럼 지역빵이 많이 있으니, 보석의 도시 익산에 다이아 몬드 모양으로 익산빵을 개발 건의	▸우리시는 ‘16년 (사)대한제과협회 익산시지부 명인들과 지역산 농산물을 사용하여 익산을 상징하는 미륵사지 석탑문양을 넣어 “익산팡”을 만들었으며, 현재 관내 제과점에서 판매중임

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
시정에바란다	익산학교급식영농조합법인에 대한건	박*애
			•익산 학교급식 영농조합법인에서 조합원마다 납품량 배분을 불공평하게 배분됨이 의심되어, 발주량과 납품량 공개요청하였으나 조합에서 거부 •익산시에서 익산학교급식영농조합법인의 작부상황과 실제 발주 및 납품상황을 감시하여 부정이 발생시 고발조치 부탁	▸익산원예농협 푸드지원센터와 익산학교급식 영농조합법인과협약을 통해 학교급식용 친환경 원예농산물을 공급하고 있음 ▸해당법인에 학교급식 공급량에 관한 사항을 투명하게 운영하도록 요구 하였으며, 법인에서 발주량 및 납품량을 조합원에게 공개하고 공평하게 배분하였음
시정에바란다	교육재난지원금	서*희	•타지역 무상급식비 남은 예산으로 교육지원금 지원한다는데, 익산시는 무상급식비 예산 어떻게 활용여부	▸코로나19 여파로 개학연기 장기화에 따른 친환경생산농가 피해 및 학부모 경제적 부담을 완화하고자 무상급식비를 활용하여 ‘학생 가정내 농산물 꾸러미’ 공급추진 ▸해당 사업을 통해 34천여명의 유치원･초･중･고등학생 각 가정에 32천원상당의 친환경농산물 꾸러미 무상공급함

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
시정에바란다	농산물꾸러미 배송에 관한 건	임*우	•농산물 꾸러미를 받았는데 누룽지 유통기한이 지난 것이 발송된것에 관한 민원제기	▸누룽지 유통 기한이 지난제품을 배송받았다는 민원이 접수되어 누룽지 생산업체 출장확인결과, 누룽지 유통기간 날인을 직원실수로 잘못표기한 것으로 추정됨 ▸생산업체에서는 제품에 이상이 없지만 잘못 표기 발송된 제품에 대하여 전량 수거 새제품으로 교환함 ▸향후 공급 식재료 관리에 철저를 기하겠음
시정에바란다	익산로컬푸드 불친절 건의	서*나	•로컬푸드 직매장 이용시 캐셔직원의 불친절함 불편사항 건의	▸익산로컬푸드 직매장 운영 및 직원에 관한사항은 위탁기관인 익산로컬푸드협동조합에서 관리하고 있음 ▸공문 발송과 방문(3회)를 통해 친절교육 정기 실시 및 재발방지 촉구
시정에바란다	쌀 수출 관련	조*석	•쌀수출언론보도와 관련 쌀수출 주체가 익산시라면, 비상시 사용할 물량에 대한 대책 여부	▸언론보도의 쌀 수출내용은 행정이 아닌 관내소재 쌀가공업체에서 수출을 한 내용이며, 비상시 사용하는 비축물량과는 상관없음

31. 시설･사무 민간위탁 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임용찬	□

□ 민간위탁현황

시설명	수탁기관	위‧수탁 금액	동의 관련			비고
			의회동의여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
익산로컬푸드 직매장	익산로컬푸드 협동조합	14,000천원	여 (익산시 로컬푸드 시설물 관리 및 운영조례)	‘20.03.01. ~ ‘23.02. 28.	‘20.03.01. ~ ‘23.02. 28.

□ 민간위탁 지도점검 현황

시설명	수탁 기관	점검 근거	점검 일자	점검 내용	지적 사항	조치 결과 (수탁기관)	비고
익산로컬푸드 직매장	익 산 로컬푸드 협동조합	익 산 로컬푸드직매장 민간위탁 협약서	56회	직매장 품질관리 및 진열상태 점검	품질 불량 상태 조치	품질불량 상품 회수 및 출하정지

32. 의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유 통 계 장		김 영 식	□

해    당    없    음

33. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

해    당    없    음

34. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유 통 계 장		김 영 식	□

해    당    없    음

35. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유 통 계 장		김 영 식	□

해    당    없    음

36. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유 통 계 장		김 영 식	□

해    당    없    음

농산유통과 요구사항

1. 익산시 푸드플랜(먹거리전략) 구축

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임용찬	□

□ 사 업 개 요

□ 사업목표 : 푸드플랜 실행을 통한 지속가능한 먹거리 선순환체계 구축

□ 사업대상 : 중소농 중심 생산자, 소비자(학생, 임산부, 청년, 취약계층 등)

□ 운영주체 : (재)익산푸드통합지원센터(이사장 : 익산시장)

▸ 사업기능 : 학교·공공급식 지역산 공급 확대, 로컬푸드직매장 운영, 먹거리 복지 및 공유 경제 활성화, 식품기업 협력사업 등

□ 추 진 실 적

□ 푸드통합지원센터 건립 부지매입 계획 수립          : ‘20. 7. 31.

▸ 함열읍 제4산단 내(부지면적 5,945㎡ / 건축면적 3,300㎡)

□ 연구용역(푸드플랜 수립, 재단법인 타당성 검토) 완료 : ‘20. 8. 7.

▸ 사업적정성, 수지분석, 조직인력, 주민복지 등 6개 분야 타당성 검토 적정

□ ‘21년 지역 푸드플랜 운영(안전·품질관리) 공모사업 선정      : ‘20. 10. 26.

□ 전북도 및 익산시 출자출연기관 운영심의위원회(설립 적정)  : ‘20. 10. 28.

□ (재)익산푸드통합지원센터 설립 및 운영 조례 제정    : ‘20. 11. 13.

□ 2021년 재단법인 출연금 심의 및 예산편성(455백만원)    : ‘20. 12. 18.

□ 재단법인 설립 임원추천위원회 구성 및 회의 개최     : ‘20. 12. 24.

□ 익산시 지역농산물 공공급식 지원 조례 제정          : ‘20. 12. 30.

□ 향 후 계 획

□ (재)익산푸드통합지원센터 직원 채용 및 출범         : ‘21. 4.~5.

□ 서부권 로컬푸드직매장 개장·운영                     : ‘21.  9.

2. 농산물 산지유통 활성화 지원

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	유통계장		김 영 식	□

□ 사 업 개 요

사 업 명	사업량	사 업 비(백만원)					비 고
		계	국 비	도 비	시 비	자 담
합 계		5,445.7	2,018.4	553	666.4	2,207.9
생산자조직화 및 통합마케팅 활성화	7개소	200		100	60	40
농산물 마케팅 지원	1식	54.7	16.4	4.9	11.5	21.9
공동선별비(농산물공동출하 확대지원)	2,498톤	405	95	28	67	215
우수농산물 물류비 지원	634톤	57			40	17
농산물 공동작업 지원체계 확충	5,968톤	355		178	35	142
농산물 산지유통센터(APC)건립지원	1개소	3,300	1,650	165	165	1,320
원예농산물 저온유통체계구축사업	1개소	858	257	77.1	179.9	344
소규모농산물 저온저장고 지원	36동	216			108	108

□ 추 진 실 적

□ 산지유통의 규모화·전문화 실현 통합마케팅조직 육성 : 2개 사업 254백만원

▸ 생산자조직화 및 통합마케팅 활성화

- 원예농산물 통합마케팅 매출 확대 : 380억원(‘19년 350→ ‘20년 380억)

▸ 농산물 마케팅 지원 : 역량강화 교육 29회, 견학 5회, 홍보·판촉 5회

□ 유통비 절감 및 물류 효율성 제고          : 3개 사업  817백만원

▸ 공동선별비 및 농산물 공동작업 지원 : 멜론 등 5품목, 8,466톤

▸ 우수농산물 물류비 지원 : 고구마, 634톤 지원

□ 산지유통 기반시설 강화                    : 3개 사업 4,374백만원

▸ 농산물 산지유통센터(APC) 건립지원 : KKMC영농조합법인(2,849m[eqn: {}^{2}]/동)

▸ 원예농산물 저온유통체계구축사업(산지저온시설)  : 여산농협(764m[eqn: {}^{2}]/동)

▸ 소규모 농산물 저온저장고지원                  : 36동(10㎡/동)

□ 문 제 점

□ 우수농산물 물류비 일부 품목 편중 지원

▸ 참여농협의 출하확대 유도와 지원대상 품목 확대 추진(1→3품목)

□ 향 후 계 획

□ 생산자 조직화 및 산지유통 활성화 추진          : 연   중

3. 로컬푸드 활성화 추진

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장		임 용 찬	□

□ 사 업 개 요

사 업 명	사업량	사 업 비(백만원)					비고
		계	국 비	도 비	시 비	자 담
합 계		3,672.7	631.5	286.6	2,698.5	56.1
로컬푸드 모니터링단 운영	4개소	16.0			16.0
로컬푸드 농산물 택배비 지원	1개소	15.0			15.0
로컬푸드 직매장 소포장재 지원	4개소	50.0			30.0	20.0
중소농 농산물 안전유통 지원	3개소	38.7		11.6	16.2	10.9
로컬푸드직매장생산소비교류활동 지원	1개소	10.0		5.0	5.0
로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원	9개소	63	31.5		6.3	25.2
서부권 로컬푸드직매장 신축	1개소	3,480	600	270	2,610

□ 추 진 실 적

□ 로컬푸드 모니터링단 운영 : 직매장 방문 29회, 잔류농약검사 100건

□ 로컬푸드 농산물 택배비지원 : 퀵서비스 539건, 일반택배 304건

□ 로컬푸드 직매장 소포장재 지원 : 4개소, 소포장재 9종(1,124,582매)

□ 중소농 농산물 안전유통 지원 : 잔류농약검사 270건, 유통물류비 143회

□ 로컬푸드직매장생산·소비교류활동지원 : 프로그램 26회, 홍보현수막 제작·게첨

□ 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원 : 9동(330㎡/동) 설치 지원

□ 서부권 로컬푸드직매장 신축(연면적 998.7㎡ / 3층)

▸ 사업내용 : 로컬푸드 직매장, 농가레스토랑(카페), 안전성검사실, 사무실 등

▸ 설계용역 납품(‘20.7.), 공사 입찰 및 발주(‘20.9.), 착공(‘20.10.), 개장(‘21.9.)

□ 문 제 점

□ 직매장 소분실 공간이 협소하여 출하농가의 불편 및 농산물 신선도 하락

▸ 소분실 증축 등 시설 보완으로 농가 편익 제고 및 안정적 공급체계 확립

□ 향 후 계 획

□ 서부권로컬푸드 직매장 농가 교육 및 조직화	: ‘21. 5. ~ 9.

□ 서부권로컬푸드 직매장 준공 및 직매장 개장	: ‘21. 9.

4. 친환경 안전농산물 학교급식 지원

확인자	:	농산유통과장			정 귀 만	□
작성자	:	로컬푸드계장			임 용 찬	□

□ 사 업 개 요

사 업 명	대상 (명)	사 업 비(백만원)				비 고
		계	도 비	시 비	교 특
합 계		18,740	4,365	5,746	8,629
학교 무상급식 지원	28,545	16,114	3,793	4,264	8,057	초 ․ 중·고
친환경농산물 학교급식지원(도)	32,747	1,788	572	644	572	유치원(공립) 초 ․ 중․ 고 ･특수
친환경농산물 학교급식지원(자체)	32,747	838		838		〃

□ 추 진 실 적

□ 학교급식 지원사업 보조금 교부결정 및 지원      : ‘20. 3. ~ ‘21. 2.

▸ 무상급식비 : 초 2,800원, 중·고등 3,500원 / 연간 190일 이내 지원

※ 학생 가정 농산물 꾸러미 공급 : 총 2회, 유치원, 초·중·고교생, 2,147백만원

- 1차(‘20. 4. 27.~ 5. 15.) : 친환경농산물 10품목, 33,479명, 1,077백만원

- 2차(‘20. 7. 27.~ 8. 21.) : 친환경농산물 및 로컬가공 8품목, 33,394명, 1,070백만원

▸ 친환경농산물 지원(도) : 친환경쌀 차액지원 및 친환경농산물 구입비 지원

▸ 친환경농산물 지원(자체) : 친환경농산물 및 유정란 구입비 지원

□ 학교급식 운영위원회 운영(공급품목 및 가격 결정 등)	: 10회

□ 학교급식 친환경농산물 안전성 검사	:  12회 / 270건

▸ 잔류농약 255건(불검출 254건, 검출 1건), GMO 8건, 방사능 7건

□ 학교급식 공급 친환경농산물 재배현황 조사	: 15회

□ 문 제 점

□ 코로나 19로 ‘20년 학교급식 학부모 모니터링단 운영 미실시

▸ ‘21년 학교급식 학부모 모니터링단 운영을 통한 급식 농산물 안전성 확보

□ 향 후 계 획

□ 안전한 농산물의 안정적 공급 체계 확립            : 연   중

5. 전북쌀 Rice-up 프로젝트 지원사업

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	양정계장		이천권	□

□ 사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘20. 1. ~ 12.

□ 사업대상 : 중신RPC

□ 사 업 비 : 300백만원(도비 150, 시비 45, 자부담 105)

□ 사업위치 : 망성면 여강로 639 (중신RPC 내)

□ 사업내용 : RPC 가공시설 개보수 및 포장라인 증설 1식

▸ 현미기 2기(5톤/시간), 진동체선별기 1기(10톤/시간), 자동 지대포장기   라인 1식(400bag/시간) 등 설치 및 기타 부대공사 등

□ 추 진 실 적

□ 사업신청                                     : ‘19. 9.

□ 사업대상자 선정                              : ‘19. 11.

□ 예산 가내시                                  : ‘19. 11.

□ 설계 및 시공업체 계약                        : ‘20. 4. ~ 6.

□ 착공 및 물품납품                             : ‘20. 7.

□ 완공                                         : ‘20. 8.

□ 보조금 지급 및 정산                          : ‘20. 9.

□ 향 후 계 획

□ 지원시설 등 사후 점검

6. 기본형 공익직불제 사업

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□

□ 사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘20. 1. ~ 12.

□ 사업대상 : 13,762농가 18,610ha

▸대 상 자 : ‘16~‘19년 기간 중 쌀·밭·조건불리직불금을 1회 이상 정당하게 지급받은 자

▸대상농지 : ‘17~‘19년까지 기간중 1회 이상 쌀·밭·조건불리직불금을 정당하게 지급 받은 농지

□ 사 업 비 : 49,962백만원(기금 38,361, 도비 1,601, 시비 10,000)

사 업 명	사업량	사 업 비(백만원)				비 고 (지원단가)
		계	기 금	도 비	시 비
합 계		49,962	38,361	1,601	10,000
논농업환경 보전직불금(자체)	11,704농가 15,020ha	10,000			10,000	663천원/ha
기본형 공익직불금	13,762농가 18,610ha	38,361	38,361			소농 1,200천원/ha 면적 1,000천원~2,050천원/ha
논농업환경 보전직불금(도비)	11,329농가 12,562ha	1,601		1,601		127.5천원/ha

□ 추 진 실 적

□ ’19년산 논농업환경보전직불금(자체) 지급(시비) / 9,958백만원	: ’20. 02.

□ ’20년도 기본형 공익직불금 지급(국비) / 38,361백만원	: ’20. 11.

□ ’20년도 논농업환경보전직불금 지급(도비) / 1,601백만원	: ’20. 12.

□ 문  제  점

□ 지급대상 농지 기준인 ‘17~‘19년 기간 중 1회 이상 쌀·밭·조건불리직불금을 정당하게 지급받은 농지 조건으로 인해 다수 농지가 지급대상에서 제외됨에 따라 대상농지 조건 확대 필요

▸ 해당 기준에 대한 법 개정안 국회 발의 중(다수농업인 혜택 포함 등)

□ 향 후 계 획

□ 농업인 경영안정을 위한 적극 사업홍보 및 보조금 지급	: 연   중

7. 고품질쌀 유통활성화(벼 건조저장시설)

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	양정계장		이 천 권	□

□ 사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘19. ~ ‘20.

□ 사업대상 : 익산통합RPC

□ 사 업 비 : 5,640백만원(국 2,256, 도 338.4, 시 789.6, 자 2,256)

□ 사업위치 : 익산시 익산통합 RPC(함열읍, 용안면)

□ 사업내용 : 벼 건조저장시설 지원

구 분	사업비(백만원)					비 고
	계	국비 (30%)	도비 (6%)	시비 (14%)	자부담 (50%)
합 계	5,640	2,256	338.4	789.6	2,256
2019년	4,400	1,760	264	616	1,760
2020년	1,240	496	74.4	173.6	496

▸ 사일로500톤 7기, 건조기 30톤 8기, 원료투입구 1식 등

※ 농림축산식품부에서는 연내 정산 종료 가능성이 불확실한 점을 고려하여 2년에 걸쳐 연차별 보조금 교부

▸ 준공 이후 건축물대장 등재, 부기 등기 등 행정절차에 상당한 기간 소요

▸ 2개년(`19~`20년) 사업 추진에 따라, `20년 사업비 잔여사업 추진

□ 추 진 실 적

□ 1년차 사업 완료                               : ‘19. 12.

□ 예산 확정(‘20년 본예산)                        : ‘20. 1.

□ 준공 및 보조금 지급                           : ‘20. 4.

□ 향 후 계 획

□ 지원 시설 등 사후점검

8. 탑마루 농산물 생산지원 및 품질강화

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□

□ 사 업 개 요

사 업 명	사 업 량	사 업 비(백만원)			비 고
		계	시 비	자 담
합 계		897	645	252
탑마루 쌀 생산단지 조성	650ha	143	65	78
탑마루 쌀 수매보상	113,750포	398	398
탑마루 농산물 생산농가 지원	4개 사업	338	164	174
탑마루 홍보 및 품질관리	연 중	18	18

□ 추 진 실 적

□ 탑마루 쌀 생산단지 조성·관리 : 27개 단지 650ha(414농가)

□ 탑마루 쌀 생산단지 포장심사 및 수매관리

▸ 포장심사에서 합격한 원료곡은 전용 창고(silo 등)에 보관

□ 탑마루 농산물 생산농가 지원사업

▸ 원예농산물(상추) 생산농가 지원(24백만원) : 타이벡부직포 78롤

▸ 공동브랜드 포장재 지원(60백만원)	: 4개소

▸ 고구마 생산농가 지원(40백만원)	: 4개소

▸ 주력품목(양파) 종자대 지원(40백만원)	: 1개소(40ha)

□ 탑마루 농특산물 품질관리 강화: 유전자 분석(쌀) 4개소, 현장점검 30개소

□ 문  제  점

□ 친환경 벼 재배 논과 근접한 관행재배 논에서 제초제 살포

▸ 수시 현장점검을 통한 제초제 살포 필지 적발‧제외(4개소 30필지)

□ 향 후 계 획

□ 품질관리 매뉴얼에 의한 현장중심 품질관리      : 연    중

9. 기업 맞춤형 익산쌀 생산 및 유통

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	탑마루계장		강 용 석	□

□ 사 업 개 요

사 업 명	사 업 량	사 업 비(백만원)			비 고
		계	시 비	자 담
합 계		1,154	842	312
CJ 햇반 원료곡 생산단지 조성	1,700ha	375	170	205
CJ 햇반 원료곡 수매보상	297,500포	446	446
하림 즉석밥 원료곡 생산단지 조성	350ha	73	35	38
하림 즉석밥 원료곡 수매보상	61,250포	122	122
하림 즉석밥 원료곡 생산 지원	3개 사업	48	24	24
익산 쌀 제주지역 물류비 지원	2개소	90	45	45

□ 추 진 실 적

□ CJ 햇반, 하림 즉석밥 원료곡 생산단지 조성

▸ CJ햇반 - 22개단지 1,700ha(1,007농가), 하림 즉석밥 - 10개단지 350ha(168농가)

□ CJ 햇반, 하림 즉석밥 원료곡 생산단지 포장심사 및 수매관리

▸ 포장심사에서 합격한 원료곡은 전용 창고(silo 등)에 보관

□ 하림 즉석밥 원료곡 생산 지원(3개소)

▸ 사업대상 : 황등농협 , 익산농협, 농협양곡(주)익산통합RPC

▸ 하림 즉석밥의 경쟁력 강화를 위한 물류비, 톤백, 팔레트 지원

□ 익산 쌀 제주지역 공급(세인푸드 외 3개소, 1,320톤)

□ 문  제  점

□ 기업 맞춤형 익산 쌀 생산단지 참여희망 농가 급증으로 면적 부족

▸ 대기업과 협력관계 강화로 익산 쌀 계약물량 최대한 확보

□ 향 후 계 획

□ 대기업과 지속적인 협력관계 유지	: 연    중

10. 농수산물도매시장 시설관리 및 운영활성화

확인자	:	농산유통과장		정 귀 만	□
작성자	:	도매시장계장	代	이형중	□

□ 현      황

(단위 : 명)

법 인 명		계	직원수 (경매사)	중도매인	매 매 참가인	하역인	비고
계(3개법인)		144	41(15)	60	8	35
청과	익산원협	74	12(10)	33	5	24
	이리청과	33	8(4)	16	3	6
수산	이리수산	37	21(1)	11	0	5

※ 주요시설 : 부지 104,061㎡, 건물 12개동 24,026㎡

(관리동, 청과물동, 채소동, 수산물동, 가공처리장, 트럭판매동, 양념동, 냉동창고 등)

□ 추 진 실 적

□ 거래량/금액 : 48,015톤 / 96,204백만원(전년대비 거래량 5.8%감소)

□ 사용료 수입 : 521백만원(시장사용료 430, 시설사용료 91)

□ 도매시장법인 지정

▸ 대  상 : 2개법인(이리청과, 이리수산)

▸ 기  간 : ‘20. 12. 30. ~ ‘25. 12. 29.(5년간)

□ 노후시설 보수공사 및 신축(2건, 127백만원)

▸ 도매시장 내 화장실 · 야외화장실 보수공사 : 5개소, 101백만원

▸ 채소동 야적창고 신축                    : 1동(104㎡), 26백만원

□ 노후시설(기계, 전기, 통신, 소방 등) 유지보수 (40건, 50백만원): 수시

□ 소방설비 안전점검(4월, 10월) / 전기설비 점검(매월)

□ 시장관리운영위원회 개최                   : ‘20. 10.

□ 의무⋅자체방역 실시(분무 및 연막)         : 매주

□ 문  제  점

□ 저온저장고 신축 공사 예정부지 연약지반으로 인한 보강방법

검토로 사업 이월

▸ 파일 기초공사 추가 시행을 통한 지내력 확보 후 사업 추진

□ 향 후 계 획

□ 안전하고 청결한 시설물 유지 관리       : 연   중