2021.  5.

제235회 익산시의회(1차 정례회)

2021 행정사무감사

	상하수도사업단

하 수 도 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2020년도 업무성과 및 반성	63
				2.	2020년도 예산집행 및 추진사항	64
				3.	2020년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	65
				4.	2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과	68
				5.	5분 자유발언 조치 결과	68
				6.	시정질문에 대한 조치 결과	69
				7.	의원발의 조례 제·개정 후 추진현황	73
				8.	주요사업 조서(3천만원 이상)	74
				9.	2020년도 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역	79
				10.	기금 운용 관련	80
				11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	80
				12.	용역사업 관련	81
				13.	인․허가 민원관련	84
				14.	각종공사 설계변경 상황	85
				15.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상)	87
				16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	90
				17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)	91
				18.	2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역	92

			19.	2020년 예산중 2021년 명시 및 사고이월 내역	93
			20.	예산 이용, 전용 사항 및 예비비 집행 현황	95
			21.	공사 준공기한 연장 내역	95
			22.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	96
			23.	국․도비 반납 현황 및 사유	96
			24.	2020년도 계획사업중 미착공사업 현황	97
			25.	2020년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	97
			26.	2020년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업	97
			27.	2020년도 예산편성후 전액 미집행 내역	98
			28.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황	98
			29.	소송 사건 현황	99
			30.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황	100
			31.	시설·사무 민간위탁 현황	103
			32.	의견제시에 대한 의회 의견 반영결과	104
			33.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황	104
			34.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업현황	104
			35.	시 산하 재단 설립 현황	105
			36.	업무협약(MOU) 등 체결 현황	105

하 수 도 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	하수도사업 공기업 운영사항	109
				2.	하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황	110
				3.	하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)	112
				4.	하수슬러지 처리사업 추진	113
				5.	하수찌꺼기 감량화사업	114
				6.	익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역 …·………	115
				7.	유천 생태습지 유지관리	116
				8.	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로정비사업	117
				9.	남부2-1, 2-2배수분구 하수관로정비사업	118
				10.	익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	119
				11.	국가산업단지 노후하수관로 정비사업	120
				12.	공공하·폐수처리시설 운영관리	121
				13.	읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사	122
				14.	지하수 이용부담금 부과·징수 현황	128

감사자료 과 공통사항

1. 2020년도 업무성과 및 반성

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 남부2.3,북부2처리분구 정비사업 추진 : 오수관로 5.2km, 배수설비 127개소

‣ 남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업 설계완료(행정절차 이행)

◦ 공공하·폐수처리시설 최적 운영을 통한 수질 및 환경 개선

‣ 하·폐수처리시설 시설 개·보수를 통한 효율 증대 : 41건/2,634백만원

‣ 하·폐수처리시설 정상 가동 및 법정 방류 수질 유지

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 추진

‣ 시설공사와 건설사업관리용역 추진 : 탈수기동 및 농축조 철거, 탈취기 설치 등

‣ 기계, 전기, 토목 등 관급자재 구입 : 탈황설비 및 가스저장조. 승온장치 등

◦ 읍면동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 하수도 정비 공사 L=2.81km, 하수도기계준설 3,268㎥

‣ 365일 상시대기 근무로 2,553건의 하수도 생활민원처리

‣ 침수대비 및 원활한 통수를 위한 맨홀 및 하수도 준설 1,531건, 하수도 점검 및 소규모 시설 보수 1,022건

□ 반      성

◦ 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진 시 행정절차 등 지연으로 적기 사업추진에 지장 초래

◦ 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 사업성 검토, 사전 행정절차 등 이행에 철저를 기하겠음

2. 2020년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

(단위:천원,%)

장	관	항	세항	예 산 현 액						지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계(A)	2020 예산액	계속비 이월액	건설개량 이월액	사 고 이월액	예비비 사용액
하수도과				84,978,121	70,523,215	11,212,699	815,485	2,426,721	0	67,672,756	13,104,567	0	4,200,798	95.1
	사업비용			38,830,329	38,830,329					37,152,198			1,678,131	95.7
		영업비용		37,771,247	37,771,247					37,083,513			687,734	98.2
			관거비	15,065,432	15,065,432					14,707,013			358,419	97.6
			처리 장비	19,913,737	19,913,737					19,786,230			127,507	99.4
			일반 관리비	2,792,078	2,792,078					2,590,270			201,808	92.8
		영업외비용		68,686	68,686					68,685			1	100
		예비비		990,396	990,396					0			990,396	0
	자본적지출			46,147,792	31,692,886	11,212,699	815,485	2,426,721	0	30,520,558	13,104,567	0	2,522,667	94.5
		유형자산취득		41,175,427	26,790,521	11,212,699	745,485	2,426,721		29,189,917	11,751,052		234,458	99.4
			구축물	39,710,103	25,325,197	11,212,699	745,485	2,426,721		27,894,913	11,612,783		202,407	99.5
			기계 장치	526,027	526,027					496,127			29,900	94.3
			차량 운반구	47,697	47,697					47,697			0	100
			공기구비품	381,600	381,600					242,072	138,269		1,259	99.7
			건설 중인 자산	510,000	510,000					509,108			892	99.8
		비가동설비 자산취득		1,331,424	1,261,424		70,000			1,328,562			2,862	99.8
		기타자본적 지출		1,355,715	1,355,715					2,079	1,353,515		121	100
		예비비		2,285,226	2,285,226					0			2,285,226	0

3. 2020년도 행정사무감사 시 지적사항에 대한 조치 결과

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
계	10건
1	•하수도사용료 현실화 계획 관련 ▸하수도 사용료 인하 이후로 현실화율이 계속 낮아지고 있는데, 장기적으로 현실화율 제고를 위한 방법은?	▸하수도사용료 현실화율 제고를 위해 장기적으로 하수도 원가 중 영업비용과 자본비용을 줄여나감으로써 현실화율을 개선할 수 있도록 추진하겠음
2	•하수도 악취문제 관련 ▸음식점, 편의점 인근에 무단으로 방류되는 하수로 인한 악취 민원이 지속적으로 증가하는바, 악취가 저감 될 수 있도록 노력하기 바람	▸하수관로를 통한 악취 발생이 최소화 될 수 있도록 하수도 준설 및 하수도 뚜껑 교체를 연중 실시하고 있음
3	•익산하수종말처리장 기준치 초과한 폐수 무단 방류로 인한 과태료 부과 관련 ▸하수종말처리장의 방류수가 기준치를 초과해 환경청으로부터 과태료처분을 받았는데 재발 방지를 위해 노력해주기 바람	▸낭산 침출수 처리수를 연계 처리하는 과정에서 일시 유입으로 방류수 기준이 초과되었으며, 하수처리장 운영에 지장이 없는 범위 내에서 연계처리량 조정, 균등 배분 처리하는 등 방류수 기준 준수에 노력하겠음
4	•하수관로 정비사업 관련 ▸아직도 구도심 지역에 오수관에 연결되지 않은 지역이 많은데, 앞으로 사업 계획이 어떻게 되는지?	▸하수도정비기본계획에 의거 순차적으로 추진하고, 기 사업 완료된 지역중 불가지역(배수구배불량, 지장물 존치 등)은 건물주 또는 토지주와 협의 후 시 예산 범위 내 점진적으로 추진하겠음
5	•국·도비 반납 관련 ▸오산문화마을 하수관로정비사업 국비 반납액이 9억원이 넘는데 사유를 설명해주기 바람	▸하수관로 정비계획 사업으로 43억원의 예산을 교부 받았으나, 환경부 재원협의시 경제성 부족으로 오산면 신오산 외 8개마을이 제외되어 이에 따른 국비 9억원을 반납하였음
6	•지하수보조관측망 관련 ▸지하수보조관측망의 체계적인 관리를 통해 효율적으로 활용하기 바람	▸지하수보조관측망은 익산시 전역 관정에 설치하여(14개소) 지하수 수위, 수온, 전기전도도를 자동으로 실시간 관측하는 시스템으로 지하수 보존을 위해 효율적으로 운영하고 있으며, 매년 추가로 설치할 예정임
7	•남부2·3, 북부2처리분구 하수관거 정비사업 관련 ▸하수관로 정비사업을 시행할 때 주민과의 소통을 활발히 해주시고, 해당 정비사업의 관망을 제출하기 바람	▸신용동 계룡, 도치마을 주변 하수관로 정비사업 시행 전에 마을 주민들과 사전 설명회를 가지고 시행하겠음(관망도 제출 완료)
8	•소송 관련 ▸하수슬러지처리시설설치공사 계약해지에 따른 도급계약해지 무효확인 및 손해배상청구 소송과 관련하여 구상권이 청구될수 있도록 사전 준비에 철저를 기하기 바람	▸전임 시장 결정에 따른 계약해지 사항으로 구상권 성립 여부에 대하여 고문변호사 자문 등 법리적 검토가 신중히 이루어져야 할 사항으로 판단됨
9	•하수도 공사 후 도로포장 관련 ▸하수도 공사 후 다짐불량 등으로 인하여 싱크홀이 발생되지 않도록 주의하기 바람	▸하수관로 정비공사 시행 시 도로침하 및 싱크홀이 발생하지 않도록 다짐을 철저히 시행하겠음
10	•하수도요금 체납에 대하여 ▸연도별 체납액이 높아지고 있어 체납 원인분석을 통하여 체납액을 줄일 수 있는 방안을 강구하기 바람	▸체납 원인 분석과 지속적인 체납 독려로 체납액을 줄일 수 있도록 하겠음

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

4. 2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
1	•남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 추진 부적정 ▸미시공부분에 대한 부당이익금 73,945,000원 회수 ▸1차분 준공구간과 준공도서 전수조사 후 누락‧오류 내용에 대해 보완조치 실시	▸2021년 6월 30일까지 회수 완료토록 하겠음 ▸1차분 준공구간 전수조사 완료, 누락 및 오류부분 시정조치 완료	전라북도 기술분야 특정감사

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당  없  음

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
확인자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

연번	시정질문사항	조치(처리)결과	비고
1	•송학동 지역 도시기반시설 마련(하수관거) ▸2010년 KTX 익산역 복합환승센터 추진 무산 후 송학동(역골지구 일원)에 도시가스 인입공사, 소방도로 개설, 하수관거 사업 등이 가능한지	▸송학동 일부 배수설비 미설치 지역에 대해서는 『익산시 하수도정비기본계획』재정비계획 수립 용역을 추진 중에 있으므로, ▸용역 후 오수 및 하수 발생량 등을 종합적으로 판단하여 세부 정비계획을 수립 추진토록 하겠음	제226회 제1차 정례회 (박철원)
2	•하수슬러지 처리사업에 대하여 ▸최초 사업추진시 지역주민 여론수렴 여부 ▸사업추진시 지역주민 요구사항은? ▸주민 요구사항 중 해결되지 못한 사업은? ▸주민요구 해결 후 해당사업을 백지화한 이유는? ▸사업을 추진하기 위한 용역비를 포함하여 생태습지 조성비용, 동산동사무소 신축 비용과 하수슬러지 처리장 사업에 따른 인센티브 차원의 각종 사업추진을 총망라한 사업비 중 백지화 당시까지 투입된 사업비 규모? ▸하수슬러지 처리동 건물 및 기계등 설비 활용 관련 해당 시설 및 제작된 기계장치 등에 대한 재활용 방안 및 고물처리나 폐기해야할 경우 폐기 등에 비용발생이 된다면 예상되는 추계금액은?	▸동산동 지역주민 80여명이 청주․용인하수처리장 하수슬러지 자원화시설 선진지 견학, 사업에 대한 서한문과 홍보물 배포, 하수처리장 교육관에서 이해관계인․주민대표 간담회 실시 등 여론수렴 절차를 충분히 거쳤음 ▸시의회 사업승인 과정,, 유입량 및 소각량 등 시설설치 기준의 적법성, 사업 미추진시 악취근절 대책, 슬러지처리시설 설치시 발생 이익을 주민들에게 어떻게 배분 할 것인지?, 장기적으로 하수처리장을 1km 떨어진 곳에 이전 등 5가지 요구사항이 있었음 ▸모두 명확하게 해결된 것은 아니지만 사업 미추진 시 악취근절 대책은 중장기 사업이므로 해결책이 나올 수 없었고 하수처리장 1km 이전은 하수관망 이설 등 2,500억원 이상 소요되므로 현실적으로 실현이 어려우며, 하수처리장 이전은 처리장 자체를 외부로 옮겨달라는 이야기이며 처리장 내에 소각시설 설치하는 것은 사안이 다른 것임 ▸사업취소 당시 상황을 보면 전임시장 입장에서는 주민반대가 격렬해서 심각하게 해결하지 않을 수 없었을 거란 생각이 듬 (동산동 주민대책위원회에서 5,000여명의 서명이 된 반대민원 제출 등) ▸공정률 17.3% 타절준공 시 투입비(설계비, 공사비, 부대비, 위탁수수료)는 36억원 정도임 ▸하수슬러지 처리동 건물은 현재 하수찌꺼기 감량화사업을 추진하면서 하수처리장의 무중단 운영을 위해 탈수기 3대를 옮겨 임시탈수기동으로 사용 중이며 기존 건물이 없었다면 이설에 필요한 건물 신축 필요한 상황이었고, 기존 시설 및 설비 등에 대하여는 공사진행 사항을 보면서 최대한 활용방안을 검토하겠음	제226회 제1차 정례회 (김태열)
3	•하수슬러지 소송 관련 ▸소송 수행 기관(변호사)과 변호사비용 등 소송을 하면서 소요된 비용 총액은? ▸업무추진을 위해 투입된 행정경비 총액 관련 공무원 출장비, 지역주민들과 함께 선진사례를 견학하면서 소요된 비용, 용역비, 시설부대비, 여비 등 기타 경비 등 총액은? ▸원고의 상고여부 동향 및 우리시 상고여부등 소송 결과 및 향후 예측은 ▸법원의 사업자에 대한 배상으로 결정시 대책은?	▸한국환경공단은 법무법인 창조에서 익산시는 정부법무공단에서 소송을 대리하였고 소송관련 비용은 총 1억원 정도 소요됨 ▸행정경비는 총 4.5억원 정도 소요됨 ▸‘20.4.15. 1심 소송이 손해배상액 12억원, 이자, 소송비용 50% 부담으로 약 16억원 배상으로 판결이 났으며 원고와 피고 둘 다 항소를 포기하여 ’20.5.1. 최종 종료 확정되었음 ▸손해배상액 약 16억원 중 한국환경공단 보유액(2억원), 우리시 기납부 감정평가액(0.56억원)을 제외한 13.5억원을 금후 추경에 반영 할 계획임	제226회 제1차 정례회 (김태열)
4	•예산낭비 등에 따른 구상권 행사 관련 ▸(하수슬러지 처리사업)잘못된 결정으로 인해 낭비된 예산에 대한 구상권 행사 검토 여부? ▸(하수슬러지 처리사업)1년전 감사결과 지적에 구상관련 사전준비를 한다고 하였는데, 1년간 구상을 위한 사전 준비가 어디까지 되어 있는지	▸사업 취소 당시 공무원들이 충분히 검토하여 보고하였기 때문에 공무원들이 보고 한 것에 대해서는 문제가 없는 것으로 판단하고 있음 ▸‘19년도에는 손해배상 청구소송이 진행중 이었고 확정 판결이 끝나야 구상권 청구 여부를 논할 수 있기 때문에 그 전에는 정보파악, 자료수집 외에는 아무것도 할 수가 없었고 구상권 청구는 엄격히 법적 요건이 갖춰줘야 되는 것임 (구상권 성립 여부에 대한 자문변호사 등의 법리적 검토 계획)	제226회 제1차 정례회 (김태열)
5	•음식물 쓰레기 처리업체 관련 ▸익산공공하수처리시설에서 음폐수 처리시 다른 지역에 비해 낮은 음폐수비용으로 음식물쓰레기처리업체가 이익을 보고 있는것에 대한 의견은?	▸하수도과에서는 익산공공하수처리시설에 연계처리되고 있는 정수장역세척수, 쓰레기매립장 침출수, 음폐수 등에 대하여 매월 실비(전력비, 약품비, 슬러지처리비, 소화율 적용) 정산하여 부과하고 있음	제226회 제1차 정례회 (임형택)

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	하수도과장		조규석	□
작성자	:	생활하수계장		최기환	□

조 례 명	공포(시행)일 / 입법구분	제․개정 주요내용	추진현황 및 금후계획	비고
익산시 공중화장실 등의 불법촬영 예방 조례	2020.11.13. / 제정	불법촬영 예방을 위한 점검체계 및 시설 구축	∙공포 완료 ∙분기 1회 점검 ∙신설 공중화장실 설치 협의 시 제6조에 따른 안심스크린 설치 유무 확인	한상욱 의원

8. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사 업 개 요	사업기간	총사업비	시공회사	공정률
계	60건		41,591
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업(1차분)	오수관로 L=30.5km 배수설비 2,616가구	2019. 05. ~ 2020. 05.	4,648	(주)성지건설	100
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업(2차분)	오수관로 L=30.5km 배수설비 2,616가구	2020. 03. ~ 2021. 03.	3,003	(주)성지건설	100
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 (전기공사, 2차분)	맨홀펌프장 설치 23개소	2020. 10. ~ 2021. 10.	56	(주)자연에너지	30
유천생태습지 시민의 숲 조성사업 토양개량공사	성토 5,200㎥ 토양개량 5,000㎡	2020. 11. ~ 2020.12.	176	(유)드림위즈	100
모현동 e편한세상아파트 하수관로 정비사업	오수관로 L=0.21km	2020. 06. ~ 2020. 07.	108	(유)대명건설	100
금곡·부평처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 L=0.48km 맨홀펌프 1개소	2019. 07. ~ 2020. 07.	1,227	(유)제중종합건설	100
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사	오수관로 L=804m 배수설비 67개소	2019. 10 ~ 2020. 05.	279	(주)대상토건	100
갈산동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 93개소	2019. 08. ~ 2020. 01.	264	(유)두산토건	100
익산시 분류식 배수설비 설치공사 실시설계용역 (함열읍, 황등면 일원)	배수설비 101가구	2020. 10. ~ 2021. 02.	37	(주)유현이엔씨	100
익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업	소화조 신설 등 (6,692㎥/일) 1식	2019. 08. ~ 2022. 02.	26,844	(주)금도건설	33
3중계펌프장 조목스크린 등 교체공사	자동식 조목스크린 교체 1식	2020. 04. ~ 2020. 07.	661	(주)대승엔지니어링	100
TOC측정기기 구입	TOC측정기기 5대 (실험실용 4, TMS용 1)	2020. 10. ~ 2021. 04.	381	영인에스티, 삼미상사	80
제3일반산업단지 공공폐수처리시설 흡인펌프 구매	흡인펌프 3식	2020. 04. ~ 2020. 06.	39	에이치피아이	100
익산시 마을하수처리장 및 중계펌프장 현장제어반 제작 구매(4공구)	춘포심암 외 4개소	2020. 10. ~ 2020. 12.	40	주은엔지니어링	100
익산시 마을하수처리장 및 중계펌프장 현장제어반 제작 구매(3공구)	왕궁상발외 20개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	44	주식회사 하이테크	100
삼기간촌 소규모 공공하수처리시설 여과기 구매	삼기간촌 여과기 1식	2020. 09. ~ 2020. 11.	85	주식회사 그레넥스	100
웅포강변 소규모 공공하수처리시설 여과기 구매	웅포강변 여과기 1식	2020. 09. ~ 2020. 12.	85	주식회사 하나엔텍	100
익산시 마을하수처리장 및 중계펌프장 현장제어반 제작 구매(2공구)	동산유천 외 31개소	2020. 06. ~ 2020. 10.	152	(사)행복드림 복지회 두리E.N.G	100
익산시 마을하수처리장 및 중계펌프장 현장제어반 제작 구매(1공구)	오산문화 외 48개소	2020. 06. ~ 2020. 10.	161	주식회사 디엠티	100
익산시 마을하수처리장 및 중계펌프장 통합 감시제어시스템 납품	3산단 처리장 내 통합관리센터 구축	2020. 07. ~ 2020. 12.	373	(주)서인지엔티	100
제3산업단지 맨홀 뚜껑교체 및 보수공사(3공구)	맨홀뚜껑교체 109개소 맨홀보수 63개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	52	유한회사 씨엘	100
2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 23개소	2020. 02. ~ 2020 .04.	49	(유)흙손건설	100
2020년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약	준설토 201㎥	2020. 03. ~ 2020. 07.	45	(유)이레건설	100
2020년 상반기 맨홀보수 공사 단가계약(1차)	맨홀보수 58개소	2020. 03. ~ 2020. 08.	45	(유)도암건설	100
2020년 읍면동지역 하수도시설 정비공사 단가계약 4차	하수도정비 14개소	2020. 04. ~ 2020. 07	49	(주)신성토건	100
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(제2산업단지 1공구)	하수관로정밀조사 L=31.8km	2020. 05. ~ 2021. 01.	191	(주)대아이엔지	100
2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 3차	준설토 208㎥	2020. 06. ~ 2020. 09.	45	(유)지수건설	100
2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 2차	준설토 221㎥	2020. 06. ~ 2020. 08.	45	(유)신안건설	100
2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 1차	준설토 213㎥	2020. 06. ~ 2020. 10.	45	(유)신안건설	100
평화동 공구거리 하수도 정비공사	D600mm 하수관로 매설 L=170m	2020. 06. ~ 2020. 09.	39	(유)한양기업사	100
2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 1차	하수도정비 15개소	2020. 07 ~ 2020. 11.	49	(유)아태건설	100
2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 2차	하수도정비 19개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	49	(주)내담건설	100
2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 3차	하수도정비 16개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	49	(주)에스제이이엔씨	100
2020년 하반기 맨홀보수공사 단가계약	맨홀보수 62개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	45	(유)은산	100
익산시 노후하수관로 정비공사	노후하수관로 정비 L=1.3km	2020. 07. ~ 2021. 07.	57	(유)주신테크	50
2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 2차	하수도정비 12개소	2020. 08. ~ 2020. 12.	49	(유)태우건설	100
2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 1차	하수도정비 12개소	2020. 08. ~ 2020. 10.	49	동서산업	100
2020년 서부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 209㎥	2020. 08. ~ 2020. 12.	45	(주)삼일공사	100
2020년 북부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 215㎥	2020. 08. ~ 2020. 11.	45	(유)이레건설	100
2020년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 208㎥	2020. 08. ~ 2020. 11.	45	(주)에스제이이엔씨	100
2020년 하반기 맨홀보수공사 단가계약 3차	맨홀보수 74개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	45	(유)태우건설	100
2020년 하반기 맨홀보수공사 단가계약 2차	맨홀보수 67개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	45	(주)수목건설	100
2020년 동부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 212㎥	2020. 09. ~ 2020. 12.	45	(주)에스제이이엔씨	100
2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(4차)	하수도준설 1식	2020. 11. ~ 2021. 03.	49	(유)이레건설	50
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(5차)	하수도정비 6개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	49	(유)태강건설	100
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(4차)	하수도정비 7개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	49	(주)수목건설	100
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(3차)	하수도정비 5개소	2020. 12. ~ 2021. 03.	49	(합)신한건설	50
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(2차)	하수도정비 6개소	2020. 12. ~ 2021. 03.	49	(유)태우건설	50
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(영등동)	하수관로정밀조사 L=18.2km	2020. 05. ~ 2021. 01.	120	(주)화인테크워터	90
익산시 노후하수관로 정밀조사용역 (제2산업단지 2공구)	하수관로정밀조사 L=34.3km	2020. 05. ~ 2021. 01.	176	(주)화인테크워터	90
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(인화동)	하수관로정밀조사 L=27.6km	2020. 05. ~ 2021. 01.	146	(주)자연과환경	90
익산시 노후하수관로 정비공사 건설폐기물(준설토) 처리용역	준설토 274㎥	2020. 09. ~ 2021. 09.	43	그린이엔티(주)	50
익산시 노후하수관로 정비공사 (2단계) 실시설계용역	하수관로정비 L=2.6km	2020. 10. ~ 2021. 08.	193	(주)고원	40
익산시 노후하수관로 정밀조사 용역(남중동)	하수관로정밀조사 L=23.1km	2020. 12. ~ 2021. 06.	134	(주)자연과환경	50
2020년 하반기 하수도기계 준설공사 단가계약(1차)	준설토 235㎥	2020. 11. ~ 2021. 01.	49	(유)주신테크	100
2020년 하반기 하수도기계 준설공사 단가계약(2차)	하수도준설 1식	2020. 11. ~ 2021. 03.	49	(유)주신테크	50
2020년 하반기 하수도기계 준설공사 단가계약(3차)	하수도준설 1식	2020. 11. ~ 2021. 03.	49	태광건설(주)	50
국가산업단지 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	L=21.4km	2019. 10. ~ 2020. 08.	293	(주)해강	95
금마면 노후하수관로 정비공사	L=140m	2019. 10. ~ 2020. 03.	122	삼운건설(주)	100
익산시 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	L=1.3km	2019. 05. ~ 2020. 06.	87	(주)성광	100

9. 2020년도 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

건 명	내 용	진정인	조치 사항	처 리 결 과
계	4건
하수관로 (우·오수관로) 신설 및 배수로 준설 (2020. 04. 29.)	배수불량으로 인한 악취 등의 사유로 관로 설치 및 준설요청	문** 외 37명	완료	저지대인 조문마을의 실정을 감안하여 준설은 즉시 실시하고 우·오수관로 신설을 익산시 하수도기본계획에 의거 연차적으로 공사추진예정
배수불량 (2020. 08. 04.)	배수불량으로 인한 물고임 및 악취 등의 사유로 도로 적치물 처리 및 배수시설 설치 요청	최**	완료	도로적치물 제거 및 노면 상태 불량에 따른 민원으로 해당 부서 민원사항 전달
배수로보수 및 교통시설물 설치 (2020. 09. 18.)	삼기면 원기산마을 일원 주택단지 개발로 하류 배수로 막힘 및 차선, 과속방지턱 설치 요청	송**	완료	도로 배수로 관련 민원으로 해당 부서 민원사항 전달
배수로 토사 복구 요청 (2020. 11. 27.)	배수로 측면 토사 유실로 인한 복구 공사 요청	김**	완료	배수로 상태는 양호하여 토사 유실 방지를 위한 콘크리트 타설 시행

10. 기금 운용 관련

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당  없  음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당  없  음

12. 용역사업 관련

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

용역의뢰건명	용역업체	총사업비	계약방법	비 고
계	49건	8,301
익산남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	(주)삼안	1,866	공개경쟁	감리용역
남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 건설폐기물 처리용역(1차분)	(주)초당산업	54	공개경쟁	폐기물 처리용역
남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 건설폐기물 처리용역(2차분)	(주)초당산업	364	공개경쟁	폐기물 처리용역
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 수밀시험 용역(1차분)	(주)씨엔코리아건설	56	공개경쟁	CCTV 용역
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 수밀시험 용역(2차분)	㈜씨엔코리아건설	50	공개경쟁	CCTV 용역
익산남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	(주)건화	962	공개경쟁	설계용역
남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업 설계경제성(VE) 검토 용역	㈜동운	26	공개경쟁	설계용역
익산시 하수도정비 기본계획 (변경)수립 용역(1차분)	(주)유신	794	공개경쟁	설계용역
익산시 하수도정비 기본계획 (변경)수립 용역(2차분)	(주)유신	903	공개경쟁	설계용역
익산 북부1처리분구 정비사업 기본 및 실시설계용역	㈜도화	1,532	공개경쟁	설계용역
갈산동 일원 분류식 하수관로 정비사업 폐기물처리용역	(주)에코건설산업	12	수의견적	폐기물 처리용역
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	(주)류한환경	25	제한경쟁	폐기물 처리용역
중앙동 일원 분류식 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	(유)다일환경산업	8	수의견적	폐기물 처리용역
금곡.부평처리분구 하수관거 정비공사 폐기물처리용역	(유)진영환경	9	수의견적	폐기물 처리용역
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사 CCTV 및 수밀시험 용역	(유)광우건설	6	수의견적	CCTV 용역
금곡.부평처리분구 하수관거 정비공사 CCTV조사 및 수밀시험 용역	(유)범룡건설	6	수의견적	CCTV 용역
금곡.부평처리분구 하수관거 정비공사 GIS DB구축 용역	(주)동운	5	수의견적	기술용역
2020년 유천생태습지 및 생태하천 복원사업 모니터링용역	(주)한가람	19	수의견적	기술용역
유천생태습지 유지관리 (2020년 해충방제용역)	(유)현대그린환경	8	수의견적	유지관리 용역
2020년도 유천생태습지 청소 용역	중앙종합공사	18	수의견적	유지관리 용역
익산시 분류식 배수설비 설치공사 실시설계용역(함열읍, 황등면 일원)	㈜유현이엔씨	37	지역제한입찰	실시설계용역
모현동 e편한세상아파트 하수관로 정비공사 실시설계 용역	㈜동운	9	수의견적	실시설계용역
금강동(구)분뇨처리장 철거폐기물처리용역	유한회사 가나환경	42	제한경쟁	폐기물 처리용역
익산공공하수처리시설 기존시설물 내진성능평가용역	㈜건설방재 기술연구원	135	제한경쟁	기술용역
익산하수찌꺼기감량화사업 기존소화조(2기)구조물안전진단용역	(사)대한산업 안전협회	18	수의견적	기술용역
익산하수찌꺼기감량화사업 준설폐기물처리용역	자연환경	19	수의견적	폐기물 처리용역
익산하수찌꺼기감량화사업 소화조준설폐기물처리용역	자연환경	26	수의견적	폐기물 처리용역
익산제3중계펌프장 악취저감계획수립용역	㈜태성환경연구소	10	수의견적	기술용역
2020년 상반기 하수도 정비공사 실시설계용역	주식회사 주한건설기술단	24	수의견적	설계용역
2020년 상반기 하수도 CCTV 촬영용역 단가계약	유한회사 대길환경	22	수의견적	CCTV 용역
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(영등동)	(주)화인테크워터	108	제한경쟁	기술용역
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(제2산업단지 2공구)	(주)화인테크워터	170	제한경쟁	기술용역
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(인화동)	주식회사 자연과환경	146	제한경쟁	기술용역
함라면 장고재마을 외 1개소 하수도 정비공사 폐기물처리용역	(주)류한환경	1	수의견적	폐기물 처리용역
평화동 공구거리 하수도 정비공사 폐기물처리용역	(주)일진도시환경	10	수의견적	폐기물 처리용역
국가산업단지 노후하수관로 정비사업 설계 경제성(V.E)검토 용역	주식회사 한가람	19	수의견적	기술용역
2020년 하반기 하수도정비공사 실시설계용역	주식회사 대한건설연구원	15	수의견적	설계용역
2020년 하반기 하수도 CCTV 촬영용역단가계약	태광건설 주식회사	6	수의견적	CCTV 용역
익산시 노후하수관로 정비공사 건설폐기물(준설토) 처리용역	그린이엔티(주)	43	수의견적 (2인이상)	폐기물 처리용역
2020년 송학동 하수도 정비공사 건설폐기물처리용역	유한회사 가나환경	3	수의견적	폐기물 처리용역
2020년 마동 하수도정비공사 건설폐기물처리용역	(유)다일환경산업	5	수의견적	폐기물 처리용역
2020년 주현동 하수도정비공사 건설폐기물처리용역	(주)에코건설산업	4	수의견적	폐기물 처리용역
익산시 노후하수관로 정비공사 (2단계)실시설계용역	주식회사 고원	193	제한경쟁	설계용역
익산시 노후하수관로 정밀조사 용역(남중동)	주식회사 자연과환경	134	일반경쟁	기술용역
국가산업단지 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	(주)해강	293	제한경쟁	설계용역
오산면 야동마을 하수도 정비공사 폐기물처리용역	(주)상현환경	8	수의견적	폐기물 처리용역
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(제1국가산업단지)	(주)대아이엔지	20	제한경쟁	기술용역
금마면 노후하수관로 정비공사 건설폐기물처리용역	(유)가나환경	14	수의견적	폐기물 처리용역
익산시 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	(주)성광	44	제한경쟁	설계용역

13. 인․허가 민원관련

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당   없  음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

날 짜	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증․감
계	21건	6,317	4,088	5,137	1,049
2020. 09.16.	남부2·3, 북부2처리 분구 하수관로 정비사업(전기공사, 1차분)	34	31	16	△15	㈜자연 에너지	2019. 09. ~ 2020. 09.	펌프장 위치 조정
2020. 11.24.	남부2·3, 북부2처리 분구 하수관로 정비사업(2차분)	3,003	2,103	3,003	900	㈜성지건설	2020. 03. ~ 2021. 03.	민원요구에 따른 금강동 부평마을 공사구간 추가 반영
2020. 11.12.	유천생태습지 시민의 숲 조성사업 토양개량공사	150	122	176	54	(유)드림 위즈	2020. 10. ~ 2020. 12.	시민의 숲 조성부지 확대요구에 따른 성토량증가
2020. 10.14.	익산시 마을하수처리장 및 중계펌프장 통합 감시제어시스템 납품	785	330	373	43	㈜서인지 엔티	2020. 07. ~ 2020. 12.	펌프장 추가 준공에 따른 통합관리센터 시스템 추가
2020. 07.21.	모현동 e편한세상아파트 하수관로 정비공사	150	82	89	7	(유)대명 건설	2020. 06. ~ 2020. 07.	지하터파기 작업자 안전을 위한 흙막이 가시설 추가 반영
2020. 01.14.	갈산동 일원 분류식 하수관로 정비공사	319	230	275	45	(유)두산 토건	2019. 08. ~ 2020. 01.	민원요구에 따른 배수설비 추가 설치
2020. 04.20	남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사	422	279	278	△1	(유)두산 토건	2019. 10. ~ 2020. 05.	각종 보험료 정산에 따른 감액
2020. 05.11.	남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사	422	278	286	8	(유)두산 토건	2019. 10. ~ 2020. 05.	민원요구에 따른 배수설비 추가 설치
2020. 03.03.	중앙동 일원 분류식 하수관로 정비공사	278	204	210	6	(유)아산 토건	2019.08. ~ 2020. 03.	민원요구에 따른 배수설비 추가 설치
2020. 02.28.	오산면 야동마을 하수도정비공사	50	28	31	3	㈜위너스 건설	2019. 11. ~ 2020. 03.	민원인 요구로 배수설비추가
2020. 03.04.	금마면 노후하수관로 정비공사	300	122	143	21	삼운건설 (주)	2019. 10. ~ 2020. 03.	지하터파기 중 통신, 전기선 등 지장물 발견되어 매달기 공종 추가
2020. 05.06.	2020년 읍면동지역 하수도시설 정비공사 단가계약 1차	30	22	19	△3	(주)성민 건설	2020. 02. ~ 2020. 06	물량변경 및 보험료정산
2020. 06.17.	낭산면 삼지마을 외 2개소 배수로 설치공사	50	36	30	△6	(유)남일 건설	2020. 05. ~ 2020. 07	농번기로 인한 공사추진 불가에 따라 현장 위치 변경
2020. 07.08.	낭산면 소도마을 외 1개소 배수관 신설공사	50	30	29	△1	(유)주신 테크	2020. 05. ~ 2020. 07.	소도마을 타부서 중첩구간으로 현장 위치변경
2020. 07.09.	왕궁면 후암마을 하수도 설치공사	35	23	15	△8	(유)범룡 건설	2020. 05. ~ 2020. 07.	포장공 및 포장철거물량 감 변경
2020. 09.22.	평화동 공구거리 하수도정비공사	39	38	39	1	(유)한양 기업사	2020. 06. ~ 2020. 09.	콘크리트 깨기물량 변경
2020. 11.09.	2020년 송학동 하수도정비공사	40	20	17	△3	(유)지수 건설	2020. 09. ~ 2020. 11.	하수관로 연장조정
2020. 11.23.	2020년 마동 하수도정비공사	40	23	27	4	(유)유성 산업	2020. 10. ~ 2020. 11.	주민 요구로 복구포장 변경
2020. 11.23.	2020년 주현동 하수도정비공사	40	37	32	△4	(주)신토성건설	2020. 10. ~ 2020. 11.	포장공 및 맨홀 설치 축소등 현장여건 반영
2020. 12.03.	성당면 외갈마을 배수로 정비공사	40	25	26	1	(유)우창 건설	2020. 05. ~ 2020. 12.	배수로 현장타설을 수로관 설치로 변경
2020. 12.29.	삼성동 부평마을 하수도 정비공사	40	25	23	△2	(주)주원 건설	2020. 05. ~ 2020. 12.	배수로 현장타설을 수로관 설치로 변경

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	총사업비	집행액	시공회사
계	39건		12,081	11,732
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업(1차분)	오수관로 L=30.5km 배수설비 2,616가구	2019. 05. ~ 2020. 05.	4,648	4,648	㈜성지건설
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업(2차분)	오수관로 L=30.5km 배수설비 2,616가구	2020. 03. ~ 2021. 03.	3,003	2,949	㈜성지건설
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 (전기공사,2차분)	맨홀펌프장 23개소 설치	2020. 10. ~ 2021. 10.	56	-	㈜자연에너지
2020년 하수시설 민원처리 단가계약	배수설비 11개소	2020. 04. ~ 2020. 08.	49	49	(유)대호건설
2020년 하수시설 민원처리 2차 단가계약	배수설비 9개소	2020. 08. ~ 2020. 12.	49	46	㈜태광건설
2020년 하수시설 민원처리 3차 단가계약	배수설비 11개소	2020. 11. ~ 2021. 03.	49	46	(유)다산종합건설
금곡·부평처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 L=0.48km 맨홀펌프 1개소	2019. 07. ~ 2020. 07.	1,479	1,461	(유)제중종합건설
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사	오수관로 L=804m 배수설비 67개소	2019. 10 ~ 2020. 05.	422	422	㈜대상토건
갈산동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 93개소	2019. 08. ~ 2020. 01.	319	319	(유)두산토건
중앙동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 35개소	2019. 08. ~ 2020. 03.	247	247	(유)아산토건
유천생태습지 시민의 숲 조성사업 토양개량공사	성토 5,200㎥ 토양개량 5,000㎡	2020. 11. ~ 2020. 12.	176	173	(유)드림위즈
모현동 e편한세상아파트 하수관로 정비공사	오수관로 L=0.21km	2020. 06. ~ 2020. 07.	108	108	(유)대명건설
2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 23개소	2020. 02. ~ 2020. 04.	49	48	(유)흙손건설
2020년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약	준설토 201㎥	2020. 03. ~ 2020. 07.	45	44	(유)이레건설
2020년 상반기 맨홀보수 공사 단가계약(1차)	맨홀보수 58개소	2020. 03. ~ 2020. 08.	45	43	(유)도암건설
2020년 읍면동지역 하수도 시설 정비공사 단가계약 4차	하수도정비 14개소	2020. 04. ~ 2020. 07.	49	48	(주)신성토건
익산시 노후하수관로 정밀 조사용역(제2산업단지 1공구)	하수관로정밀조사 L=31.8km	2020. 05. ~ 2021. 01.	191	134	(주)대아이엔지
2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 3차	준설토 208㎥	2020. 06. ~ 2020. 09.	45	43	(유)지수건설
2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 2차	준설토 221㎥	2020. 06. ~ 2020. 08.	45	44	(유)신안건설
2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 1차	준설토 213㎥	2020. 06. ~ 2020. 10.	45	44	(유)신안건설
평화동 공구거리 하수도 정비공사	D600mm 하수관로 매설 L=170m	2020. 06. ~ 2020. 09.	100	39	(유)한양기업사
2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 1차	하수도정비 15개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	49	47	(유)아태건설
2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 2차	하수도정비 19개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	49	49	(주)내담건설
2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 3차	하수도정비 16개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	49	47	(주)에스제이이엔씨
2020년 하반기 맨홀보수 공사 단가계약	맨홀보수 62개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	45	43	(유)은산
익산시 노후하수관로 정비공사	하수관로정비 L=1.3km	2020. 07. ~ 2021. 07.	57	-	(유)주신테크
2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 2차	하수도정비 12개소	2020. 08. ~ 2020. 12.	49	46	(유)태우건설
2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 1차	하수도정비 12개소	2020. 08. ~ 2020. 10.	49	49	동서산업
2020년 서부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 209㎥	2020. 08. ~ 2020. 12.	45	43	(주)삼일공사
2020년 북부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 215㎥	2020. 08. ~ 2020. 11.	45	43	(유)이레건설
2020년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 208㎥	2020. 08. ~ 2020. 11.	45	43	(주)에스제이이엔씨
2020년 하반기 맨홀보수공사 단가계약 3차	맨홀보수 74개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	45	42	(유)태우건설
2020년 하반기 맨홀보수공사 단가계약 2차	맨홀보수 67개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	45	42	(주)수목건설
2020년 동부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 212㎥	2020. 09. ~ 2020. 12.	45	43	(주)에스제이이엔씨
2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(4차)	하수도준설 1식	2020. 11. ~ 2021. 03.	49	47	(유)이레건설
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(5차)	하수도정비 6개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	49	49	(유)태강건설
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(4차)	하수도정비 7개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	49	46	(주)수목건설
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(3차)	하수도정비 5개소	2020. 12. ~ 2021. 03.	49	49	(합)신한건설
2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(2차)	하수도정비 6개소	2020. 12. ~ 2021. 03.	49	49	(유)태우건설

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당  없  음

17. 국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업 개요	사업 기간	2020년 예산액				집행액
			계	국비	도비	시비
계	9건		31,463	21,090	2,587	7,786	23,346
남부2·3,북부2처리분구하수관로 정비사업	오수관로 L=30.5km	2019. 05. ~ 2022. 12.	1,447	1,013	43	391	1,176
남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업	하수관로 L=15.3km	2019. 01. ~ 2023. 12.	321	142	14	165	26
북부1처리분구 하수관로 정비사업	하수관로 L=35.6km	2020. 01. ~ 2024. 12.	714	500	21	193	490
익산공공하수처리 시설 하수찌꺼기 감량화사업	감량화사업 1식	2018. 01. ~ 2022. 02.	13,293	9,305	1,994	1,994	8,121
익산시 노후하수관로 정비사업	하수관로정비 L=1.3km	2019. 01. ~ 2021. 12.	1,900	950	95	855	1,324
국가산업단지 노후하수관로 정비사업	하수관로정비 L=23.8km	2019. 10. ~ 2023. 12.	1,000	500	50	450	107
익산시 노후하수관로 정밀조사용역	하수관로 정밀조사 L=110km	2020. 01. ~ 2021. 05.	794	397		397	569
'06하수관거 임대형민자사업(BTL)	하수관거 L=86.5km	2008. 04. ~ 2011. 05.	5,643	3,837	180	1,626	5,583
'09하수관거 임대형민자사업(BTL)	하수관거 L=99km	2011. 02. ~ 2014. 08.	6,351	4,446	190	1,715	5,950

18. 2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	사업기간	이월액	집행액	공정률	비고
계	11건		3,165	3,134
익산시 하수도정비 기본계획 수립용역	하수도정비 기본계획 수립 1식	2019. 01. ~ 2021. 12.	402	397	100	사고
금강부평 금곡마을 분류식관거 배수설비설치공사	오수관로 L=0.48km (추진공법) 맨홀펌프 1개소	2018. 01. ~ 2020. 07.	671	654	100	사고
마동/주현지구 오수관정비 및 배수설비 설치공사	배수설비 4가구	2018. 03. ~ 2020. 02.	16	14	100	사고
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	배수설비 100가구	2018. 02. ~ 2020. 05.	907	900	100	사고
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	배수설비 30가구	2018. 09. ~ 2021. 03..	203	203	100	건설개량 (명시)
익산시 노후하수관로 정비사업	노후관로정비 L=1.3km	2019. 02. ~ 2020. 12.	509	509	100	건설개량 (명시)
금마면 노후하수관로 정비사업	2.0×1.5m 우수박스 설치 L=140m	2019. 10. ~ 2020. 03.	33	33	100	건설개량 (명시)
금마면 노후하수관로 정비사업	2.0×1.5m 우수박스 설치 L=140m	2019. 10. ~ 2020. 03.	151	151	100	사고
오산면 야동마을 하수도정비공사	D400mm 하수관로 설치 L=106m	2019. 12. ~ 2020. 03.	43	43	100	사고
익산시 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	노후하수관로 정비 L=1.3km	2019. 05. ~ 2020. 06.	44	44	100	사고
국가산업단지 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	노후하수관로 정비 L=23.8km	2019. 10. ~ 2021. 06.	186	186	100	사고

19. 2020년 예산중 2021년 명시 및 사고이월 내역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	사업기간	총사업비	집행액	공정률	비고
계	13건		5,238	1,783
천서왕궁지구 하수관거 정비사업 국고보조금 정산 잔액 반납	집행잔액 반납	2015. ~ 2019.	1,313	0	0	건설개량 (명시)
익산시 하수도정비 기본계획 수립용역	하수도정비 기본계획 수립 1식	2019. 01 ~ 2021. 12.	800	787	95	건설개량 (명시)
모현e편한 배수설비 설치공사(주민참여예산)	오수관로 0.2km 배수설비 4개소	2020. 01. ~ 2020. 07.	150	108	100	건설개량 (명시)
익산 금마 공공하수처리시설 증설	Q=1,100㎥ → Q=1,600㎥	2020. ~ 2023.	270	0	0	건설개량 (명시)
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	배수설비 4가구	2020. 10. ~ 2021. 03.	12	12	100	사고
익산공공하수처리시설 내진성능평가용역	익산공공하수처리 시설 기존시설물 내진성능평가	2020. 10. ~ 2021. 03.	135	135	100	건설개량 (명시)
						건설개량 (명시)
					80
				270
			381
		2020.10. ~ 2021. 04.
	TOC측정기기 5대 구입
TOC측정기기구입
						건설개량 (명시)
			576		80 (1차분 공사중)
		2019. 02. ~ 2021. 12.
	노후하수관로정비 L=1.3km
익산시 노후하수관로 정비사업
			893		95 (설계중)	건설개량 (명시)
		2019.10. ~ 2023.12.
	노후하수관로정비 L=23.8km
국가산업단지 노후하수관로 정비사업
			65		60 (설계중)
		2020. 10. ~ 2022. 12.
	노후하수관로정비 L=2.6km
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 실시설계용역						건설개량 (명시)
			225	116	90 (조사중)	건설개량 (명시)
		2020. 02. ~ 2021. 05.
	노후하수관로 정밀조사 L=110km
익산시 노후하수관로 정밀조사용역
			200	143	70	사고
		2020. 11. ~ 2021. 05.
	민원처리 단가계약 5건
읍면동지역 생활하수관련 민원처리
				212		건설개량 (명시)
			218		100
		2020. 11. ~ 2021. 03.
	하수도기계준설 단가계약 5건
하수도기계준설

20. 예산 이용, 전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

해  당   없  음

21. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

22. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액  반납한 예산현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

23. 국․도비 반납 현황 및 사유

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업기간	반납액	반납일자	사유	비고
계	1건		2
고도처리시설 원리융자금	하수도 고도 처리시설	2004. 12. ~ 2019. 12.	2	2020.08.20.	정산잔액 반납	국비

24. 2020년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

25. 2020년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

26. 2020년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

27. 2020년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	예산액	사업비	집행액	공정률	비고
계	2건	1,583	1,583	-	-
익산 금마 공공하수처리시설 증설	Q=1,100㎥ → Q=1,600㎥	270	270	-	-
천서왕궁지구 하수관거 정비사업 국고보조금 정산 잔액 반납	집행잔액 반납	1,313	1,313	-	-

28. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

해  당   없  음

29. 소송 사건 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황
		원고	피고	일자	관할법원
도급계약해지 무효확인 등 (인천지법 2015가합 51346)	하수슬러지처리시설 설치공사 계약해지에 따른 도급계약해지 무효확인 및 손해배상청구소송	코오롱환경서비스 (주) 외 3	한국환경공단 외 1	2015. 02. 15.	인천 지방 법원	2015.02.12. 도급계약 해지 무효확인 및 손해배상 소송제기되어 2020.05.06. 소송 종결 ▸손해배상 : 1,551백만원(이자 353백만원 포함) ▸소송비용(50%) : 55백만원
CSOs 입찰담합 (2015가합 568478)	새만금유역 초기우수처리시설 설치사업 입찰시 참여 업체간 담합행위로 발생한 손해배상금 청구의 건 (투찰율 98.8%로공정위 적발)	익산시 김제시	고려개발주식회사 외 1	2015. 10.30.	서울 중앙 지방 법원	2015.10.30. 소장접수 2020.08.14. 화해권고결정 ▸입찰담합에 따른 손해배상금 10억원을 원고 익산시에 지급
하수도 사용료 부과 취소소송 (전주지방법원2019구합1231)	원고의 오폐수는 피고가 설치한 공공하수처리시설이 아닌 별도의 폐수종말처리시설에 유입하므로 하수도 사용료 부과 취소주장	신일섬유주식회사 외2	익산시	2019. 05.22.	전주 지방 법원	2020.10.26. 조정권고 불수용으로 부과취소 2021.01.14. 각하판결
구상금청구 (서울중앙 지방법원 2020가소 1889940)	마동 어울누리 앞 노상에 피보험차량이 도로 주행중 맨홀뚜껑이 튀어올라 차량이 파손된 사고	삼성화재해상보험주식회사	익산시	2020. 06.12.	서울 중앙 지방 법원	2021.01.29. 사건 종결 확정 2021.03.09. 영조물배상공제 보험사고 자기부담금 지급(500천원)
구상금청구 (전주지방법원 2020가소 72620)	부송동 제2공단사거리 인근 도로 주행 중 맨홀뚜껑이 열려있어 피보험차량의 파손된 사고	현대해상화재보험주식회사	익산시	2020. 12.28.	전주 지방 법원	2020.12.28. 소장 송달 2021.01.20. 답변서 제출

30. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
계	19건
하수관로 매설 요청 (2020.03.20.)	주택 신축으로 농배수로로 하수 유입, 하수관로 매설 요청	유**	완료	신축 주택 입주자 회의 및 마을 주민의 의견 수렴 완료되어 조치 완료(2020.03.25)
배수로 막힘 (2020.03.23.)	배수로 이물질 유입으로 인하여 막힘	이**	완료	토사 및 비닐 등으로 인한 농배수로 막힘 조치완료(2020.03.25)
악취 해소 요청 (2020.03.25)	모현동 300번 정류장 앞 하수도 악취	강**	완료	악취방지 뚜껑 교체(2020.03.26)
배수로 막힘 (2020.03.22.)	토사 유출로 인하여 배수로 막힘	임**	완료	맨홀 및 관로 토사 퇴적 확인 및 준설(2020.03.26)
하수구 해충 (2020.03.31)	하수구에서 벌레가 너무 많이 나옴	정**	완료	악취방지 뚜껑 교체(2020.03.31)
악취 해소 요청 (2020.04.29)	부송동 1076번지 동양상가 앞 우수관 악취 발생	이**	완료	악취방지 뚜껑 교체(2020.04.29)
맨홀 뚜껑 유실 (2020.05.24.)	익산대로 20길 37-9 명지장파크 인근 맨홀뚜껑 유실	변**	완료	개인 사유지 맨홀, 시설물 소유주에게 민원 안내(2020.05.26.)
악취 해소 요청 (2020.06.09.)	익산대로 90길 16 ~ 익산대로 70길 20 부근 하수도 악취가 건물 내부로 유입	장**	완료	악취가 건물 내부로 유입되지 않도록 조치(2020. 06. 10)
우수관로 보수 요청 (2020.06.16)	삼기면 간촌2길 172 생활용수 및 우수 배출에 따른 제방 유실 보완 요청	심**	완료	우수관은 이상 없으나 용수로의 사면이 유실되어 발생하는 문제로 공사 시행(2020. 07. 03)
도로배수관리 (2020.06.14)	은기동 36-1 인근 아스콘 포장 후 물고임	조**	완료	포장면 침하 보수(2020.06.17.)
싱크홀 보수 요청 (2020.07.01)	도로 횡단보도 싱크홀	이**	완료	도로 파손 조치 완료(2020.07.02.)
맨홀 소음 보완 (2020.07.10)	도로 맨홀 보수요청	문**	완료	맨홀 보수 조치 완료(2020.07.17.)
유천생태습지 이용 불편사항 (2020. 07. 15.)	유천생태습지 예초작업 요청	강**	완료	예초작업 완료(2020.08.31.)
배수로 막힘 (2020.07.30)	모현동프라임학원앞 배수로막힘	김**	완료	관로 이상 없으나 폭우(호우경보)로 인하여 배수가 지연, 해당현장에 대하여 준설(2020.08.04.)
건물 침수 (2020.07.30)	주현로 55 도로 침수로 인한 사무실 피해	성**	완료	폭우(호우경보)로 인하여 건물내부로 우수가 유입, 모래주머니 지원, 도로측 우수관로를 정비(2020.08.04.)
건물 침수 (2020.07.30)	주현로 55 매년 사무실 침수	박**	완료	폭우(호우경보)로 인하여 건물내부로 우수가 유입, 모래주머니 지원, 도로측 우수관로를 정비(2020.08.04.)
물고임 (2020.08.03)	남중동 79-25 빗 물 고임 및 안전사고 유발배수로	설**	완료	현장확인 결과 일부 구간에서 빗물 고임이 확인 보수 실시(2020.08.04.)
보도블럭 꺼짐 (2020.07.30)	부송동 1032-4 보도블럭 땅꺼짐	이**	완료	보도블럭 침하가 확인되어 조치완료(2020.08.06.)
침수피해 (2020.08.07.)	익산대로 58길 37 일원 집중호우 시 침수 피해	김**	완료	국지성 호우에 따른 일시적인 하수배제 문제, 하수도준설 등의 하수관로 지속적 관리(2020.08.14.)
하수도 복개 요청 (2020.08.07.)	낭산면 소도1길 18일원 하수관로 정비 요청	김**	완료	해당 현장 공사 완료(2020.08.20.)
집중호우시 맨홀뚜껑 열림 (2020.08.09.)	부송동 1089-1 일원 호우 시 맨홀뚜껑 열림	김**	완료	국지성 호우에 따른 일시적인 하수배제 문제, 조치완료(2020.08.14.)
집중호우시 배수불량 (2020.08.08.)	주현로4길 일원 집중호우로 인한 우수배제 불량	김**	완료	국지성 호우에 따른 일시적인 하수배제 문제, 하수도준설 등의 하수관로 지속적 관리(2020.08.14.)
하수도 복개 요청 (2020.09.14.)	동산동 702-23(서동로24길 31-12) 하수도 복개 요청	김**	완료	해당 현장 공사 완료(2020.09.17.)
맨홀소음 (2020.09.20.)	인북로 40길 11 맨홀 소음 보수	유**	완료	맨홀 보수 조치 완료(2020.09.23.)
포장 파손 (2020.09.25.)	북문교회~왕언니밥상 사이 하수도 포장 파손	박**	완료	해당 현장 보수 완료(2020.10.06)
하수구 뚜껑 파손 (2020.09.28.)	동산동 1095-5 공원 내 하수구 뚜껑 파손	박**	완료	맨홀 뚜껑 보수 완료(2020.10.07)
배수불량 (2020.10.14.)	영등동 210-40 인근 교회 벽측 배관 파손, 인도 싱크홀 보수 및 오물 유입 방지 조치 요망	김**	완료	해당 건물주와 면담하여 누수 및 인도 블록 침하에 대하여 보수공사 요청(2020.10.15.)
악취 민원 (2020.11.03.)	팔봉동 468-21번지 일원 하수관로 악취 발생	이**	완료	민원인 소유의 개인 부지에 설치된 하수시설물 원인으로 현장에서 설명(2020.11.05.)

31. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	하수도과장		조규석	□
작성자	:	하수운영계장		이성철	□

□ 민간위탁현황

시설명	수탁기관	위‧수탁금액	동의 관련			비 고
			의회동의 여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
익산 공공하폐수처리시설	환경시설관리(주), (유)대신환경개발	2,892 백만원/년	여 (익산시사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 제4조의 4)	2019. 09. 01. ~ 2022. 08. 31.	2020. 01. 01. ~ 2022. 08. 31.

□ 민간위탁 지도점검 현황

시설명	수탁기관	점검근거	점검일자	점검내용	지적사항	조치결과 (수탁기관)	비고
익산 공공하폐수처리시설	환경시설관리(주), (유)대신환경개발	익산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 시행규칙 제 14조	매월 10일	관리대행비 적정 사용여부, 처리수질 적정여부 등	-	-

32. 의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당   없  음

33. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

해  당   없  음

34. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당   없  음

35.  시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당   없  음

36. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당   없  음

감사자료 과 요구사항

1. 하수도사업 공기업 운영사항

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 현      황

◦ 자    산 : 금424,915백만원(자본 319,426  부채 105,489)

◦ 부채비율 : 24.8%(부채총계 / 자기자본 × 100)

⃞ 추 진 실 적

◦ 하수도사용료 부과·징수 : 부과액 22,993백만원, 징수액 22,743백만원(98.9%)

◦ 연도별 하수도사용료 현실화율 현황

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
사용료수익 (백만원)	16,208	19,763	24,635	25,690	22,993
㎥당 원가(원)	1,895.46	1,925.41	1,941.63	1,980.49	2,086.94
㎥당 요금(원)	442.39	556.50	695.78	737.22	680.38
현실화율(%)	23.33	28.89	35.83	37.22	32.60

◦ 원인자부담금 부과·징수 : 부과액 1,459백만원, 징수액 1,459백만원(100%)

◦ 여유자금 효율적 관리 : 예금액 15,403백만원(이자수입 328백만원)

2. 하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 부과징수 현황(2020년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	부과액 (B)	징수액 (C)	체납액 (D)	부과율 (B/A)	징수율 (C/B)
계	23,029	22,993	22,743	250	99.8	98.9
가정용	11,452	11,271	11,240	31	98.4	99.7
일반용	9,541	9,443	9,389	54	98.9	99.4
대중탕용	199	356	311	45	178.8	87.3
산업용 및 산업단지 처리구역	1,837	1,923	1,803	120	104.6	93.7

□ 연도별 체납액 현황

(단위 : 백만원, %)

년 도 금 액	합계	2020	과년도
			계	2019	2018	2017	2016 이전
계	632	250	382	143	127	36	76
가정용	67	31	36	5	1	1	29
일반용	193	54	139	34	33	31	41
대중탕용	73	45	28	8	11	4	5
산업용 및 산업단지 처리구역	299	120	179	96	82	-	1

□ 고액체납자(30만원 이상)행정조치 현황(지하수)

구분	체납액		행정조치				비고
			압류예고(독촉)중		압류
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	22	175	13	86	9	89
일반용	14	144	6	66	8	78
대중탕용	8	31	7	20	1	11

(단위 : 건, 백만원)

□ 추 진 실 적

◦ 징수대책반 편성 운영(2개조 7명)

▸체납자 유형별 분석(단순체납, 고질체납, 부도, 무재산 등)

▸전화·방문 체납 독려(징수) : 122건

- 소액(10만원 미만) : 전화 및 SMS(문자 메시지) 등 활용

- 고액(10만원 이상) : 체납자를 직접 방문하여 납부 독촉

◦ 고질체납자 징수 관리

▸ 대상 : 30만원 이상 또는 5회 이상 체납자

▸ 관리 : 체납액 납부 독촉(3회) 후 불이행 시 재산 압류 등 행정처분하고, 무재산 및 행방불명자는 결손처분 검토

3. 하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

□ 채무상환 계획(시비 부담분)

(단위: 백만원)

사 업 명	임대료	상환액	상 환 계 획
			계	2021	2022	2023	2024이후
계	62,474	25,940	36,534	3,038	3,038	3,038	27,420
‘06 하수관거정비 BTL민간투자사업	29,422	14,893	14,529	1,425	1,425	1,425	10,254
‘09 하수관거정비 BTL민간투자사업	33,052	11,047	22,005	1,613	1,613	1,613	17,166

□ 채무 상환조건

재 원 별	용 도	상환조건	이율	상환기간	채권기관
‘06 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2011 ~2031	(주)푸른익산환경
‘09 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2014 ~2034	(주)청정익산

4. 하수슬러지 처리사업 추진

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하 수 운 영 계 장		이 성 철	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 하수찌꺼기 자원화시설 설치사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사 업 량 : 건조시설 100㎥ 1기, 에너지 회수시설(소각) 44㎥ 1기

◦ 사 업 비 : 19,800백만원(국비70%, 시비30%)

◦ 도 급 자 : 코오롱환경서비스(주)

� 추 진 실 적

◦ 하수슬러지 처리시설 설계 용역	: 2006. 08.

◦ 하수슬러지 처리시설 턴키 계약	: 2013. 06.

◦ 동산동 주민 소각시설 반대민원(5,000여명)	: 2014. 07.

◦ 하수슬러지 처리시설 공사계약 해지(공정률 17.3%)	: 2014. 12.

◦ 도급계약 해지 무효확인 및 손해배상소송 제기	: 2015. 02.

▸ 배상요구액 : 2,422백만원

◦ 소송 종결(원고일부승)	: 2020. 05.

▸ 손해배상 : 1,551백만원(이자 353백만원 포함)

▸ 소송비용 : 55백만원(50% 부담)

◦ 손해배상액(13.5억원) 지급	: 2020. 08.

5. 하수찌꺼기 감량화사업

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내 (익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 년 ~  2022년

◦ 사 업 비 : 268억원(국비 70%, 도비 15%, 시비13%, 기금 2%)

◦ 사업내용

▸ 기존 소화조 개선(10,000㎥/일) 및 신설(6,692㎥/일)

▸ 가스저장설비, 가스정제설비, 기계식 농축기, 탈취설비 등 신설

□ 추 진 실 적

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 타당성 조사 용역 완료	: 2017. 02.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약	: 2017. 12.

◦ 설계 경제성(VE) 검토용역 완료	: 2018. 10.

◦ 설계의 기술자문, 재원협의, 설치변경인가 등 행정절차 이행	: 2018. 12. ~ 2019. 08.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019. 06.

◦ 시설공사(1차분) 착공	: 2019. 08.

◦ 시설공사(1차분) 준공	: 2020. 07.

◦ 시설공사(2차분) 착공	: 2020. 03.

▸ 전체 공정률 33%

6. 익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2021. 12. (3년)

◦ 총사업비 : 1,700백만원 (시비)

▸ 2020년 사업비 : 900백만원

◦ 사업내용 : 개발여건 변화에 따른 하수처리구역 확대검토, 금마하수처리장 증설검토, 소규모 공공하수처리장 신·증설 계획 검토 등

□ 추 진 실 적

◦ 기본계획수립용역 익산시 계약심사	: 2019. 02.

◦ 기본계획수립용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 05.

◦ 기본계획수립용역 착수	: 2019. 07.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립용역 중간보고회	: 2020. 11.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 승인 신청	: 2021. 01.

▸ 승인 소요기간 약 12개월을 감안하여 사업기간 연장 조정

(2019. 01. ~ 2020. 12. ⇒  2019. 01. ~ 2021. 12.)

7. 유천 생태습지 유지관리

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 규    모 : 생태습지관리 134,521㎡

▸ 잔디 및 풀 깎기(55,330㎡), 수목(교목 1,503주, 관목 44,200주), 정자 2개, 퍼걸러 8개, 바닥분수 1개, 등의자 36개, 평의자 30개 및 수질 관리 등

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 360백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 유천생태습지 청소용역	: 2020. 01. ~ 12.

▸ 유천생태습지 정리 및 화장실 2개소 청소

◦ 유천생태습지 및 생태하천 복원사업 모니터링 용역     : 2020. 01. ~ 12.

▸ 수질 검사 24회, 토양 오염조사 2회, 생물다양성 조사 2회 등

◦ 주민편익시설 시설보강 설치	: 2020. 01. ~ 12.

▸ 수목 식재(이팝나무 80주, 팽나무 80주), LED가로등 7주 설치

▸ 예초 및 전정적업, 초화류 식재(국화), 안내판 정비 등

8. 남부2·3, 북부2처리분구 하수관로정비사업

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남부2처리분구 (동산동 · 인화동 · 평화동 일부)

남부3처리분구 ( 금강동 · 신흥동 · 용제동  일부)

북부2처리분구 (영등1동 · 영등2동 · 신용동 일부)

◦ 규    모 : 오수관로 30.5km , 배수설비 2,616가구

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년간)

◦ 사 업 비 : 36,490백만원(국비 70%, 지방비 30%)

▸ 2020년 사업비 : 1,447백만원(국비 1,013 도비 43 시비 268 기금 123)

□ 추 진 실 적

◦ 사업 선정	: 2016. 12. 23.

◦ 기본 및 실시설계용역 전라북도 원가심사	: 2017. 03.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약심의	: 2017. 04.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2017. 06. 19.

◦ 동산동, 인화동 주민설명회 개최(2회)	: 2017. 11. / 2018. 02.

◦ 행정절차 이행 (재원협의, 기술심의, 원가검토)	: 2018. 04. ~ 12.

◦ 시설공사 시행(1차분)	완료	: 2019. 05. ~ 2020. 05.

◦ 시설공사 시행(2차분) 시행	: 2020. 03. ~ 2021. 03.

▸ 공정률 : 44%

9. 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로정비사업

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 규    모 : 오수관로 15.3km , 배수설비 1,290가구

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)

◦ 사 업 비 : 18,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)

▸ 2020년 사업비 : 321백만원(국비 142 도비 14 기금 165)

□ 추 진 실 적

◦ 2019 국고보조사업 확정	: 2018. 12. 26.

◦ 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가(P.Q)	: 2019. 05. 14.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2019. 07. 24.

◦ 설계경제성(VE) 검토 용역 완료	: 2020. 07. 13.

◦ 익산시 기술자문 완료	: 2020. 08. 28.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2020. 09. 22.

▸ 총사업비 증액 및 국고보조율 조정 협의 중

10. 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 규    모 : 노후우수박스 정비 L=2.6km

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

◦ 사 업 비 : 12,110백만원(국비 6,055 도비 605 시비 5,450)

▸ 2020년 사업비 : 220백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 03.

◦ 2021년 국고보조 신규 사업 신청(환경부)	: 2020. 02.

◦ 실시설계용역비 추경 확보(220백만원)	: 2020. 07.

◦ 2021년 국고보조 신규 사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

▸ 공정률 : 60%

11. 국가산업단지 노후하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원(40만평)

◦ 규    모 : 노후 우·오수관로 정비 L=23.8km

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

◦ 사 업 비 : 15,077백만원(국비 7,539 도비 754 시비 6,784)

▸ 2020년 사업비 : 1,000백만원(국비 500 도비 50 시비 450)

□ 추 진 실 적

◦ 국고보조금 예산 신청(환경부)	: 2019. 02.

◦ 국가산업단지 노후하수관로 기술진단 시행	: 2019. 10.

◦ 실시설계용역 착수	: 2019. 10.

◦ 국고보조사업 확정	: 2019. 12.

◦ 국가산업단지 하수관로 정밀조사용역 시행	: 2020. 06.

◦ 설계경제성(VE) 검토용역 시행	: 2020. 09.

◦ 익산시 감사위원회 기술자문 완료	: 2020. 09.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2020. 10.

12. 공공 하·폐수처리시설 운영관리

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

□ 시설운영현황

◦ 공공하수처리시설(BTO 사업)

▸ 운 영 사 : ㈜전북엔비텍

▸ 운영기간 : 2008. ~ 2028.

▸ 운 영 비 : 15,536백만원(2020년)

시 설 명	익산	익산북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량(㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소

◦ 공공하 ‧ 폐수처리시설(민간위탁 관리대행)

▸ 운 영 사 : 환경시설관리(주), (유)대신환경개발

▸ 위탁기간 : 2020. ~ 2022.

▸ 운 영 비 : 2,682백만원(2020년)

시 설 명	하수처리시설			폐수처리시설
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량(㎥/일)	600	1,760	85개소	5,500	5,000	4개소

□ 추 진 실 적

◦ 하수처리장(4개소) 수질검사 실시(유입수 및 방류수 BOD 등 6개 항목)

▸ 매월 시료 채취 전라북도 보건환경연구원 수질분석 실시 : 12회

◦ TMS 및 통합관리시스템을 활용한 적정수질 유지 및 시설물 상시 모니터링

◦ 월 3회 산업단지 입주업체의 수질측정 실시

◦ 매년 안전관리계획 수립 후 안전보건교육 및 비상대비 훈련 실시

13. 읍·면·동지역 하수도 시설 및 준설공사

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

□ 사업개요 및 추진사항

(단위 : 백만원, %)

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비	도급자	공정률
	계 : 72건			2,157
1	2020년 동절기 하수도 기계준설공사 단가계약	준설토 107㎥	2020. 01. ~ 2020. 03.	21	(유)보건	100
2	2020년 동절기 하수도 정비공사 단가계약	하수도정비 3개소	2020. 01. ~ 2020. 04.	21	(유)성옥건설	100
3	2020년 읍면동지역 하수도시설 정비공사 단가계약 1차	하수도정비 12개소	2020. 02. ~ 2020. 04.	19	(주)성민건설	100
4	2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리 공사 단가계약 1차	하수도정비 23개소	2020. 02. ~ 2020. 04.	48	(유)흙손건설	100
5	2020년 읍면동 주민예산 편성사업 단가계약(1차)	하수도정비 10개소	2020. 02. ~ 2020. 04.	21	브살렐건설(주)	100
6	2020년 읍면동 주민예산 편성사업 단가계약(2차)	하수도정비 8개소	2020. 02. ~ 2020. 06.	20	(주)포이닉스	100
7	석암동 관동마을 하수도 정비공사	하수관로 설치 L=153m	2020. 02. ~ 2020. 04.	12	(주)백두	100
8	2020년 북부지역 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	준설토 105㎥	2020. 03. ~ 2020. 07.	21	(유)우승건설	100
9	2020년 동부지역 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	준설토 113㎥	2020. 03. ~2020. 06.	21	(유)광우건설	100
10	2020년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약	준설토 201㎥	2020. 03. ~ 2020. 07.	44	(유)이레건설	100
11	2020년 상반기 맨홀 보수공사 단가계약(1차)	맨홀보수 58개소	2020. 03. ~ 2020. 08.	43	(유)도암건설	100
12	2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 3개소	2020. 03. ~ 2020. 07.	22	(주)부경건설	100
13	2020년 읍면동지역 하수도시설 정비공사 단가계약 2차	하수도정비 3개소	2020. 03. ~ 2020. 07.	21	(주)건지토건	100
14	삼성동 외화마을 외 1개소 하수도 정비공사	하수관로설치 L=193m	2020. 04. ~ 2020. 06.	19	(주)영신건설	100
15	2020년 읍면동지역 하수도시설 정비공사 단가계약 3차	하수도정비 11개소	2020. 04. ~ 2020. 08.	20	(유)덕산건설	100
16	2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리공사 단가계약 3차	하수도정비 2개소	2020. 04. ~ 2020. 08.	22	(유)정진건설	100
17	2020년 시내일원 노후하수관로 정비사업 단가계약 1차	하수도정비 9개소	2020. 04. ~ 2020. 08.	22	(유)흙손건설	100
18	2020년 시내일원 노후하수관로 정비사업 단가계약 2차	하수도정비 4개소	2020. 04. ~ 2020. 07.	22	(유)동화개발	100
19	2020년 읍면동지역 하수도시설 정비공사 단가계약 4차	하수도정비 14개소	2020. 04. ~ 2020. 07.	48	(주)신성토건	100
20	낭산면 삼지마을 외 2개소 배수로 설치공사	하수관로 설치 L=234m	2020. 05. ~ 2020. 06.	17	(유)남일건설	100
21	왕궁면 후암마을 하수도 설치공사	하수관로 설치 L=52m	2020. 05. ~ 2020. 07.	10	(유)범룡건설	100
22	낭산면 소도마을 외 1개소 배수관 신설공사	하수관로 설치 L=160m	2020. 05. ~ 2020. 07.	19	(유)주신테크	100
23	삼성동 부평마을 하수도 정비공사	하수관로 설치 L=175m	2020. 05. ~2020. 12.	13	(주)주원건설	100
24	영등동 노후하수관로 정비공사	하수관로 설치 L=80m	2020. 05. ~ 2020. 07.	20	(유)신원건설	100
25	성당면 외갈마을 배수로 정비공사	하수관로 설치 L=72m	2020. 05. ~ 2020. 12.	21	(유)우창건설	100
26	함라면 장고재마을 외 1개소 하수도 정비공사	하수관로 설치 L=237m	2020. 06. ~ 2021. 01.	17	(주)금송건설	100
27	우남그랜드타운 인근 하수관로 보수공사	하수관로 설치 L=85m	2020. 05. ~ 2020. 06.	20	(주)동국하이텍 익산지사	100
28	하수도민원처리 하수도 기계준설공사 단가계약	준설토 111㎥	2020. 06. ~ 2020. 08.	21	(주)에스제이이엔씨	100
29	2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 3차	준설토 208㎥	2020. 06. ~ 2020. 09.	44	(유)지수건설	100
30	2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 2차	준설토 221㎥	2020. 06. ~ 2020. 08.	44	(유)신안건설	100
31	2020년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약 1차	준설토 213㎥	2020. 06. ~ 2020. 10.	44	(유)신안건설	100
32	평화동 공구거리 하수도 정비공사	하수관로 설치 L=170m	2020. 06. ~ 2020. 09.	39	(유)한양기업사	100
33	영등동 선화51길 긴급 복구공사	긴급보수 L=18m	2020. 07. ~ 2020. 08.	11	(유)남일건설	100
34	하수도 포장 복구공사	아스콘포장 A=3,301㎡	2020. 07. ~ 2020. 10.	17	(유)장원건설	100
35	2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리공사 단가계약 4차	하수도정비 8개소	2020. 07. ~ 2020. 09.	21	(유)엠제이이엔씨	100
36	2020년 읍면동지역 생활하수관련 민원처리공사 단가계약 5차	하수도정비 7개소	2020. 07. ~ 2020. 09.	21	(유)도암건설	100
37	2020년 읍면동지역 하수도시설 개선공사 단가계약 1차	하수도정비 15개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	47	(유)아태건설	100
38	2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 2차	하수도정비 19개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	49	(주)내담건설	100
39	2020년 읍면동 지역 하수도시설 개선공사 단가계약 3차	하수도정비 16개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	48	(주)에스제이이엔씨	100
40	2020년 하반기 맨홀 보수공사 단가계약	맨홀보수 62개소	2020. 07. ~ 2020. 11.	43	(유)은산	100
41	익산시 노후하수관로 정비공사	노후하수관로정비 L=1.3km	2020. 07. ~ 2021. 07.	57	(유)주신테크	50
42	2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 3차	하수도정비 13개소	2020. 08. ~ 2020. 12.	22	(유)원광수도사	100
43	2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 4차	하수도정비 6개소	2020. 08. ~ 2020. 10.	21	(주)유성산업	100
44	2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 2차	하수도정비 12개소	2020. 08. ~ 2020. 12.	46	(유)태우건설	100
45	2020년 읍면동지역 주민생활 편익사업 단가계약 1차	하수도정비 12개소	2020. 08. ~ 2020. 10	49	동서산업	100
46	2020년 서부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 209㎥	2020. 08. ~ 2020. 12.	44	(주)삼일공사	100
47	2020년 북부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 215㎥	2020. 08. ~ 2020. 11	44	(유)이레건설	100
48	2020년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 208㎥	2020. 08. ~ 2020. 11	43	(주)에스제이이엔씨	100
49	2020년 하반기 맨홀 보수공사단가계약 3차	맨홀정비 74개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	42	(유)태우건설	100
50	2020년 하반기 맨홀 보수공사단가계약 2차	맨홀정비 67개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	43	(주)수목건설	100
51	2020년 동부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 212㎥	2020. 09. ~ 2020. 12.	43	(주)에스제이이엔씨	100
52	2020년 읍면동 생활하수관련정비공사 단가계약 2차	하수관로 설치 L=129m	2020. 09. ~ 2020. 10.	22	(주)한빛엔지니어링	100
53	2020년 읍면동 생활하수관련 정비공사 단가계약 1차	하수관로 설치 L=124m	2020. 09. ~ 2020. 11.	22	(유)한국티엠에스	100
54	2020년 송학동 하수도정비공사	하수관로 설치 L=168m	2020. 09. ~ 2020. 11	17	(유)지수건설	100
55	2020년 왕궁면 발산리 하수도정비공사	하수관로 설치 L=103m	2020. 09. ~ 2020. 11	17	(유)남성건설	100
56	2020년 주현동 하수도정비공사	하수관로 설치 L=128m	2020. 10 ~ 2020. 11	18	(주)신토성건설	100
57	2020년 시내일원 노후하수관로 정비사업 단가계약 4차	하수도정비 11개소	2020. 09. ~ 2020. 12.	21	선진산업	100
58	2020년 시내일원 노후하수관로 정비사업 단가계약 3차	하수도정비 9개소	2020. 09. ~ 2020. 11	21	(유)우석건설	100
59	2020년 마동 하수도 정비공사	하수관로 설치 L=130m	2020. 10 ~ 2020. 11	27	(주)유성산업	100
60	2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(5차)	하수도준설 1식	2020. 11 ~ 2021. 03.	21	(유)한국티엠에스	50
61	2020년 하수도민원처리 기계준설공사 단가계약	준설토 110㎥	2020. 07. ~ 2020. 11.	21	(주)포이닉스	100
62	2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(4차)	하수도준설 1식	2020. 11. ~ 2021. 03.	47	(유)이레건설	100
64	2020년 하반기 읍면동 생활하수 관련 민원처리 단가계약(1차)	하수도정비 4개소	2020. 11. ~~ 2021. 03.	21	브살렐건설(주)	100
65	2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(5차)	하수도정비 6개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	49	(유)태강건설	100
66	2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(4차)	하수도정비 7개소	2020. 11. ~ 2020. 12.	47	(주)수목건설	100
67	2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(3차)	하수도정비 5개소	2020-12 ~ 2021. 03.	47	(합)신한건설	100
68	2020년 하반기 읍면동 생활하수관련 민원처리 단가계약(2차)	하수도정비 6개소	2020. 12. ~ 2021. 03.	44	(유)태우건설	100
69	2020년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 4개소	2020. 12. ~ 2021. 02.	22	(주)성운건설	100
70	2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 235㎥	2020. 11 ~ 2021. 01.	47	(유)주신테크	100
71	2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(2차)	하수도준설 1식	2020. 11 ~ 2021. 03.	48	(유)주신테크	50
72	2020년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(3차)	하수도준설 1식	2020. 11 ~ 2021. 03.	48	태광건설(주)	50

14. 지하수 이용부담금 부과․징수 현황

확인자	:	하수도과장		조 규 석	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

□ 부과징수 현황

(단위: 백만원)

년 도	부 과		징 수		징수율(%)
	건수	금액(A)	건수	금액(B)	(B/A)
2020	4,299	268	4,150	256	95.5

□ 추 진 실 적

◦「익산시 지하수 관리 조례」제정 완료	: 2014. 4. 17.

◦ 지하수이용부담금 부과·징수	: 2016. 9. 15.

▸ 부과 제외 대상시설: 가정용, 농업용, 학교, 사회복지, 비상.간이 급수시설 등

▸ 이용부담금 부과면제: 부과금액이 월 2,000원 미만 (톤당 85원)

◦ 매월 지하수 사용량 검침 및 고지서 발송	: 2020. 1. ~ 12.

◦ 안전한 지하수 사용 홍보 및 체납분 납부 독려	: 2020. 1. ~ 12.

▸ 장기체납자 재산압류 : 31건

▸ 체납금 방문 및 전화 납부 촉구 징수 : 195건(징수액 10,910천원)