2021.  5.

제235회 익산시의회(1차 정례회)

2021 행정사무감사

	환경안전국

늘푸른공원과

	□		감사자료 공통사항
			1.	2020 업무성과 및 반성 ………………………………	277
			2.	2020 예산집행 및 추진사항 …………………………	278
			3.	2020년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 ……	280
			4.	2020년도 감사시 지적사항 및 조치 결과 …………………	284
			5.	5분 자유 발언 조치 결과 ………………………………	284
			6.	시정질문에 대한 조치 결과 …………………………	285
			7.	의원 발의 조례 제·개정 후 추진현황 ……………	285
			8.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	286
			9.	2020년도 각종 민원 접수 및 처리내역 ………	290
			10.	기금 운용 관련 ……………………………………	291
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	291
			12.	용역사업 관련 ………………………………………	293
			13.	인․허가 민원처리 관련 사항 ………………………	297
			14.	각종공사 설계 변경상황 ……………………………	298
			15.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) …………………	301
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………………	304
			17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …………	304
			18.	2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 ………	305
			19.	2021년도 명시이월 내역 ……………………………	305
			20.	예산 전용, 이용 및 예비비 집행 현황 ……………	306
			21.	공사 준공기한 연장 내역 ……………………………	306
			22.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	306
			23.	국․도비 반납 현황 및 사유 ………………………	307

				24.	2020년도 계획사업 중 미착공사업 현황 …………	308
				25.	2020년도 계획사업 중 유보 및 취소된 사업현황 …	308
				26.	2020년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업 ………	308
				27.	2020년도 예산편성 후 전액 미집행 내역 ……………	309
				28.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황 ……………	309
				29.	소송 사건 현황 ……………………………………	309
				30.	시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ……	310
				31.	시설·사무 민간위탁 현황 …………………………	311
				32.	의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과 ……………	311
				33.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황 ……	311
				34.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황 …	312
				35.	시 산하 재단 설립 현황 …………………………	312
				36.	업무협약(MOU) 등 체결 현황 ……………………	312
	□		과 요구사항
				1.	가로수 조성 및 관리 ………………………………	315
				2.	명품가로숲길 조성사업 추진 현황 ………………	316
				3.	꽃향기 가득한 익산만들기 ………………………	317
				4.	500만 그루 나무심기 사업 추진 현황 ……………	318
				5.	인화공원 조성사업 추진 현황 …………………	319
				6.	도시공원 및 녹지관리 추진 현황 …………………	320

감사자료 공통사항

1. 2020 업무성과 및 반성

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 성      과

◦ 500만 그루 나무심기 사업 원활한 추진(목표달성률 144%)

▸수목식재 734,208그루 (공공부문 647,949 민간부문 86,259)

▸내 나무심기 운동(재난위기극복) 시민의 숲 대상지 발굴 및 토양개량

▸나무 나누어주기(단감 외 27,680주) 및 내 나무심기 운동(소나무 외 850주)

▸【민간부문】푸른익산가꾸기 공모사업, 자체 식재 등 10개 사업 추진

◦ 가로수, 도시숲 조성 및 관리로 쾌적한 녹색도시 미관개선

▸가로수 조성사업 5㎞(왕벚 380주 식재, 왕벚 전지 1,125주)

▸도시숲 조성 4개소, 유휴부지 수목식재 8개소, 명상숲 조성 8개소, 학교 공원화 사업 5개소

◦ 명품가로숲길 조성으로 녹색네트워크 구축 추진

▸모현동 명품가로숲길 조성사업 1.1㎞(느티나무 등 7종 11,286주 식재)

▸어양동 명품가로숲길 조성사업 0.9㎞(남천 등 16종 11,918주 식재)

◦ 인화공원 조성사업 추진

▸대규모 도시숲 (2차) 조성(A=15,000㎡)

▸무장애나눔길 조성사업 공모 선정(L=1.3㎞, B=6m)

◦ 아름다운 도시경관 조성사업 추진

▸자연 친화적 감성 꽃거리 조성 : 시 경계 진입로 등 5개소 30㎞ 등

▸꽃향기 가득한 익산 만들기 : 540개 기관 및 학교 초화류 21만 본 지원

▸전북대학교 특성화 캠퍼스 내 5,000㎡ 꽃밭조성

◦ 공원 시설물 안전관리 강화로 범죄 사전 예방

▸공원 화장실 불법 촬영 카메라 점검 : 52개소(매월1회) 점검

▸여성화장실 안심벨 신규 설치 : 30개소

□ 반      성

◦ 사업추진 시 상대성 민원에 따른 이해충돌 및 시기별 민원 집중에 따른 신속 처리 지연

▸이해설득을 위한 적극적 행정 및 사전 조치를 통한 민원 발생 최소화

2. 2020 예산집행 및 추진사항

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

【2020. 12. 31. 기준】	(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액				지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2020 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액
늘푸른공원과				9,982,240	9,174,444	807,796	0	9,752,091	214,286	1,872	13,991	97.7
	녹색환경도시조성			9,937,579	9,129,783	807,796	0	9,707,432	214,286	1,872	13,989	97.7
		도시림등조성		6,404,233	6,404,233	0	0	6,184,930	214,286	244	4,773	96.6
			도시숲조성사업 (가로수조성) (전환사업)	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	100.0
			도시숲 유지관리	933,248	933,248	0	0	933,175	0	0	73	99.9
			가로화단 조성 및 관리	571,891	571,891	0	0	571,891	0	0	0	100.0
			수목양묘장 조성 및 관리	30,069	30,069	0	0	30,018	0	0	51	99.8
			꽃양묘장 관리 및 꽃 조성	485,140	485,140	0	0	483,363	0	0	1,777	99.6
			중앙분리대 수목관리	109,072	109,072	0	0	109,072	0	0	0	100.0
			산림서비스 도우미 운영지원	41,664	41,664	0	0	41,663	0	1	0	100.0
			도로변병해충	82,201	82,201	0	0	82,201	0		0	100.0
			생활권 수목진료 지원	6,249	6,249	0	0	5,936	0	204	109	95.0
			도시숲조성사업 (명상숲조성) (전환사업)	480,000	480,000	0	0	480,000	0	0	0	100.0
			녹색일자리확충	16,480	16,480	0	0	16,475	0	1	4	99.9
			꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기	586,922	586,922	0	0	585,300	0	0	1,622	99.7
			가로수 유지관리	476,297	476,297	0	0	476,297	0	0	0	100.0
			학교공원화사업	69,000	69,000	0	0	67,901	0	0	1,099	98.4
			도시숲조성사업 (도시숲조성) (전환사업)	1,000,000	1,000,000	0	0	785,714	214,286	0	0	78.6	사고 이월
			미세먼지차단숲 조성사업	116,000	116,000	0	0	115,924	0	38	38	99.9
			녹색자금 지원사업	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	100.0
		공원계획 및 조성		1,542,079	734,283	807,796		1,535,321	0	0	6,758	99.6
			공원리모델링	300,000	300,000	0	0	299,852	0	0	148	99.9
			황등공원 조성사업	220,119	220,119	0	0	220,096	0	0	23	99.9
			전라선 폐선부지 공원조성사업	117,664	117,664	0	0	117,663	0	0	1	99.9
			도시숲조성사업 (대규모도시숲 조성)	723,241	0	723,241	0	723,241	0	0	0	100.0
			망성면 농촌형 주민힐링공원 조성사업	111,055	26,500	84,555	0	110,776	0	0	279	99.7
			공원조성계획결정	40,000	40,000	0	0	35,183	0	0	4,817	88.0
			대규모도시숲 명품가로숲 유지관리	30,000	30,000	0	0	28,510	0	0	1,490	95.0
		근린공원녹지관리		1,991,267	1,991,267	0	0	1,987,181	0	1,628	2,458	99.8
			공원녹지시설 유지관리	1,144,139	1,144,139	0	0	1,140,958	0	1,628	1,553	99.7
			공원녹지 수목 유지관리	847,128	847,128	0	0	846,223	0	0	905	99.9
	재무활동			3,526	3,526	0	0	3,524	0	0	2	99.9
		보전지출		3,526	3,526	0	0	3,524	0	0	2	99.9
			재무활동(보전지출)	3,526	3,526	0	0	3,524	0	0	2	99.9
	행정운영경비			41,135	41,135	0	0	41,135	0	0	0	100.0
		기본경비		41,135	41,135	0	0	41,135	0	0	0	100.0
			기본경비	41,135	41,135	0	0	41,135	0	0	0	100.0

3. 2020년도 행정사무감사시 지적사항 조치결과

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	• 어린이공원 및 놀이터 리모델링 등 사업 추진 철저 ▸관련 조례까지 제정되어 있으나, 추진 실적 및 계획이 저조한 것 같음. 체육진흥과 등 관련 부서와 협조하여 적극적인 사업 추진 바람	▸동초, 백제어린이공원 2개소를 자연친화 놀이공간으로 조성하기 위해 순천시 기적의 놀이터 현장견학을 통해 우리 시 여건에 맞는 시설물 설치를 설계에 반영하였고, 아동복지과, 인근 초등학교 등의 의견 수렴 절차를 통해 소규모 부지 여건에 맞는 아기자기하고 자연 친화적인 시설물을 설치 완료하였음 ▸추후 어린이공원의 시설물 상태, 입지조건 등을 종합적으로 검토하여 개·보수 시 공원 실정에 맞는 생태 놀이시설 조성을 추진할 계획임
2	• 원광대 자연식물원 코디네이터 관련 ▸더 많은 시민이 이용할 수 있도록 코디네이터 활용을 홍보하시기 바라며 공문으로 신청한 단체 방문객 외 개인 방문객도 코디네이터의 해설을 받을 수 있도록 검토하여 주시기 바람	▸코디네이터 활용 홍보 및 개인 방문객에 대한 해설 활용이 이루어질 수 있도록 원광대학교 자연식물원에 협조 요청하였고, 지속적으로 적극 홍보하고 있음
3	• 이월사업비 작성 관련 오류 문제 ▸제출된 자료에 누락된 이월사업이 있는 것 같음. 자료 작성에 철저를 기하시기 바람	▸자료 작성에 철저를 기하겠음
4	• 500만그루 나무심기사업 관련 ▸500만 그루 나무심기와 민자공원 개발 사업은 상충되는 부분이 있는 거 같음. 민간개발 사업 추진 시 기존 나무가 훼손되지 않도록 관련 부서와 협조 하에 사업 추진을 해주시기 바람	▸민간특례사업은 기 훼손지를 활용하여 비공원시설을 계획하고 있으며, 또한 환경영향평가 등을 통해 양호한 임상이 훼손되지 않도록 도시전략사업과와 협조하여 추진하고 있음
5	• 식재 확대와 주차장 조성 상충 ▸식재 확대 사업과 주차장 조성 사업은 상충되는 면이 있는데, 주차장 조성사업이나 민자공원 개발 시 식재 문제를 소홀히 하지 않도록 해주시기 바람	▸민자공원 개발 시 주차장 부지에 식재되어 있는 수종을 공원부지에 이식할 수 있도록 조치하겠음
6	• 송학동 한전부지 공원조성 관련 ▸관계 법령상 공원조성이 어렵다고 하는데, 관련 부서와 협조 하에 조성 방안을 강구하여 사업 추진 해주시기 바람	▸해당 지역은 익산망기 공공지원민간임대주택 지정제안 단계로, 공원녹지 13,588㎡ 조성 계획이 포함되어 있음
7	• 공원 내 화장실 청소 철저 ▸에코르아파트 인근 공원 등 공원 화장실 내 쓰레기가 제대로 처리되지 않아 지저분함. 공원 내 화장실 청소에 철저를 기하시기 바람	▸관내 공원 및 공중화장실을 매일 청소하고 있으며 유지관리에 철저를 기하겠음
8	• 각종 계약시 특정업체 편중 ▸지역 동종업체들에게 공정하게 기회가 갈수 있도록 노력 바람	▸수의계약 대상 건(추정가격 22백만원 이하) 대해서는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의거 수의계약 시행중임
9	• 전국체전/소년체전 시 사용한 대형화분 재활용 ▸전국체전 , 소년체전 시 사용된 대형화분의 경우 방치되다시피 하고 있으며, 심지어 쓰레기통으로 사용되는 경우도 있음. 활용할 수 있는 방안을 강구하시기 바람	▸전국체전/소년체전 시 사용한 대형화분은 주요도로변 및 시 진입로에 재설치 완료하였으며, 계절별 꽃식재로 가로환경을 개선하고 있음
10	• 인화공원 조성사업 관련 ▸명품가로숲길에 식재된 고사목 처리를 철저히 하고 식재에만 그칠 것이 아니라 사후관리에도 노력하시기 바람	▸6월, 9월 공원 제초작업을 시행하였고, 10월 하자검사를 통해 고사목을 보식하였으며, 지속적인 사후관리에 만전을 기하겠음
11	• 영등동 공원개발지구 주차장 부족 해결 관련 ▸현행 법령상 주차장 조성이 어렵다고 하는데 법령을 준수하고, 관련 부서와 협조 하에 주차장 조성이 가능한지 적극적으로 검토하기 바람	▸해당 부지는 조성 완료된 완충녹지로, 익산국가산단 아름다운 거리 조성 사업과 관련하여 교통행정과에서 주차장 60면 조성 예정임
12	• 공원 내 남녀공원화장실 분리 문제 ▸전년도 7월 제출된 자료와 2020년도 행정사무감사 자료의 조치결과 내역이 상이함. 같은 일이 재발하지 않도록 자료 제출에 철저한 확인 바람	▸자료 작성에 철저를 기하겠음
13	• 공원 내 공중화장실 불법촬영 카메라 점검 철저 ▸불법촬영 문제의 심각성을 감안하여 월1회 이상 점검해주시기 바람	▸공원 내 공중화장실(52개소)에 대해 월1회 점검 실시하고 있음
14	• 부송동 푸른솔공원 수종 교체 ▸기존 조성된 소나무가 고사하고 있어, 수종 변경이 필요해 보임	▸2019년도 편백나무 1,000본 식재 완료하였음

4. 2020년도 감사시 지적사항 및 조치결과

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	공원조성계장		진준용	□

발언 의원 / 발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
오임선 의원 / 제223회 익산시 임시회 (2020.3.18. 제2차 본회의)	∙놀이구조물의 틀에서 벗어난 흙과 나무가 공존하는 자연친화 놀이공간 필요	∙동초, 백제어린이공원 2개소를 자연친화 놀이공간으로 조성하기 위해 순천시 기적의 놀이터 현장견학을 통해 우리 시 여건에 맞는 시설물 설치를 설계에 반영하였고, 아동복지과, 인근 초등학교 등의 의견 수렴 절차를 통해 소규모 부지 여건에 맞는 아기자기하고 자연 친화적인 시설물을 설치 완료하였음 ∙추후 어린이공원의 시설물 상태, 입지조건 등을 종합적으로 검토하여 개·보수 시 공원 실정에 맞는 생태 놀이시설 조성을 추진할 계획임

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황(예산, 내용 등)

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

8. 주요 사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

사 업 명	사업비 (천원)	사 업 량	진도(%)	비고
계	4,321,468	35건
2020년 공원(녹지) 수목식재 사업	42,504	배산휴먼공원 외 5개소 이팝나무 168주 식재	100	당해
1공단 가로화단 정비사업	86,349	회양목 11,120주 식재	100	당해
2공단 가로화단 관목식재사업	87,680	영산홍 14,663주 식재	100	당해
선화로 띠녹지 조성사업	80,570	회양목 등 2종 9,456주 식재	100	당해
무왕로 띠녹지 조성사업	58,176	회양목 등 2종 6,210주 식재	100	당해
이리중앙초 명상숲 조성사업	37,246	배롱, 이팝나무 2주, 수수꽃다리, 화살나무 등 관목 4종 3,190주	100	당해
이리초 명상숲 조성사업	50,152	소나무, 청단풍 등 27주, 남천, 영산홍 등 관목 4종 1,560주	100	당해
이리중 명상숲 조성사업	50,270	소나무, 배롱나무 등 25주, 남천, 화살나무 등 관목 4종 1,250주	100	당해
오산남초 명상숲 조성사업	51,948	상수리, 자작나무 등 34주, 남천, 수수꽃다리 등 관목 4종 2,120주	100	당해
함열여중 명상숲 조성사업	54,028	소나무, 배롱나무 등 32주, 남천, 수수꽃다리 등 관목 5종 1,220주	100	당해
용안초 명상숲 조성사업	49,910	소나무, 배롱나무 등 27주, 남천, 영산홍 등 관목 4종 1,910주	100	당해
여산초 명상숲 조성사업	50,643	소나무, 청단풍 등 23주, 남천, 화살나무 등 관목 4종 2,250주	100	당해
성북초 명상숲 조성사업	50,078	소나무, 배롱나무 등 18주, 남천, 불두화 등 관목 6종 2,050주	100	당해
1공단 관목 식재사업	70,171	영산홍 12,000주 식재	100	당해
시온육아원 복지시설 나눔숲(실외) 조성사업	182,615	소나무 등 교목 11종 91주, 화살나무 등 관목 9종 4,010주 등 식재	100	당해
모현동 명품가로숲길 조성사업	247,516	느티나무 등 4종 7,520주 식재	100	당해
어양동 명품가로숲길 조성사업	254,360	청단풍 등 15종 6,826주 식재	100	당해
706 지방도 가로수 정비사업	228,748	왕벚나무 식재 380주, 전정 884주	100	당해
500만 그루 나무심기 유휴부지(전북대특성화캠퍼스) 수목식재사업	103,566	느티나무 등 교목 33주, 남천 등 관목 2,860주 식재	100	당해
무궁화 도시숲 조성사업	80,283	무궁화 1,672주, 회양목 985주 식재, 흙콘크리트 300㎡ 등	100	당해
국도26호선 가로수 정비사업	37,554	왕벚나무 전정 241주	100	당해
공원설치용 이동식화장실 구입 설치 사업	49,227	목천공원 이동식 화장실 1조 설치	100	당해
동초어린이공원 리모델링사업	194,722	생태놀이터 시설물 설치(모래포설, 오름놀이대, 조합놀이대, 통나무징검다리 등)	100	당해
백제어린이공원 리모델링사업	85,100	생태놀이터 시설물 설치(모래포설, 통나무징검다리, 바구니그네, 통과놀이대 설치 등)	100	당해
2020년 제3산업단지 녹지 예초사업	59,307	예초 및 풀모으기, 제거 143,433㎡	100	당해
내 나무심기 운동 시민의 숲 토양개량사업	37,104	토양개량(T500, 배합비율 1:20) 3,000㎡ 등	100	당해
대규모 도시숲 조성사업(2차)	887,278	교목 14종 297주, 관목 12종 10,153주, 지피 6종 1,900본. 잔디 8,463㎡ 식재 등	100	20년 명시 이월 (723,241)
2020년 제3산업단지 녹지 및 함열농공단지 예초사업	48,660	예초 164,994㎡	100	당해
동산동 도시숲 조성사업 (동신아파트 뒤)	119,157	소나무, 황금사철 등 22종 4,125주 식재, 인조화강설블럭 포장 227㎡ 등	100	당해
모현동 도시숲 조성사업 (신기마을 입구)	117,988	이팝나무, 화살나무 등 21종 5,014주 식재, 통석앉음벽 1개소, 파고라 1식 설치 등	100	당해
수변경관 도시숲 조성사업	339,527	팥배나무, 배롱나무 등 12,803주 식재	100	당해
익산국가산업단지 도시숲 조성사업	251,503	소나무, 회양목 등 27종 8,357주 식재, 인조화강설블럭포장 540㎡, 디딤석 포장 47㎡, 맹암거 설치 201m 등	20	21년 사고 이월 (214,286)
가을철 어양동 명품가로숲길 조성사업	65,854	영산홍 등 3종 5,092주 식재	100	당해
가을철 모현동 명품가로숲길 조성사업	64,843	이팝나무 등 5종 3,766주 식재	100	당해
명상숲 조성지 초화류 식재사업	46,831	수선화, 튤립등 초화류 구근 24,300본 식재	100	당해

9. 2020년도 각종 민원 접수 및 처리 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	공원조성계장		진준용	□

▣ 민원 접수처리 현황

(단위 : 건수)

합 계	진 정	질 의	요 청	탄 원	건 의
1	1	-	-	-	-

▣ 민원 접수처리 내역

종류	건명	민원인	요구내용	처리내용
진정	인화공원 임대계약 해지에 따른 보상금 요구	김용희	▪민원인은 꽃 직매장을 운영하는 자로, 한국철도시설공단에 1,000㎡ (2015. 11. 5., 2017. 3. 9.)를 국유재산 유상사용 허가를 득하여 사용 중이었으나 ▪익산시가 인화공원 조성을 위해 사용허가를 득함에 따라 민원인의 임대계약 허가가 취소되었고, 이에 따른 기존 허가부지 내 지장물 보상 요구	▸전라북도 감사관-4514호(2020.4.17.) 및 익산시 감사담당관-2600호(2020.4.20.)와 관련하여 국유재산 부지 내 지장물 보상에 대한 사전컨설팅 결과 ▸ ｢국유재산법｣제36조 및 ｢공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률｣제68조에 따라 감정평가를 실시하고 지장물 보상비를 지급하였음

10. 기금 운용 관련

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	가로수환경계장		이미란	□

□ 위원회 설치 현황

위원회명	설치근거 (설치일자)	심의,의결,자문기능 여 부	위 원 수
			계	공무원	시의원	전문가	관련 단체	유관기관
익산시 도시림등의 조성․관리 심의위원회 (위원장: 환경안전국장)	「익산시 가로수 및 도시림 등의 조성․관리 조례」제6조 (2008. 1. 11.)	자 문	7	1	-	5	1	-

□ 위원회 예산 및 운영 현황

위원회명 (운영횟수)	구분	회의일자	회의록		수 당 지급액 (천원)	비고
			공개일자	공개방법
익산시 도시림등의 조성ㆍ관리 심의위원회 (1회)	대면	’20.11.11.	’20.11.17.	시 홈페이지	280	․미세먼지 차단숲 조성사업 추진 관련 자문 ․행정지원과 예산 집행

□ 각종 위원회에서 심의하여 단체장의 의견이 수정된 사례

해    당    없    음

□ 단체장이나 부단체장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회 현황

해    당    없    음

□ 위원회 위원 명단

□ 익산시 도시림등의 조성․관리 심의위원회

연번	성 명	소 속	직 위	비고
1	김성도	익산시	환경안전국장	당연직
2	김근섭	(사)푸른익산가꾸기운동본부	이사장	위촉
3	진영문	한국산림기술사협회 전북지부	지부장	위촉
4	권상진	한국산림기술사협회 전북지부	이사	위촉
5	박율진	전북대학교 환경생명자원대학	교수	위촉
6	안득수	전북대학교 농업생명과학대학	교수	위촉
7	전경수	원광대학교 농식품융합대학	교수	위촉

※ 위촉기간 : 2020. 2. 3. ~ 2022. 1. 31.(2년)

12. 용역사업 관련

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 용역비 산출근거(추계서) 포함 계획서 결재사본 및 확보예산

별        첨

□ 용역사업(용역명, 용역업체, 용역비, 계약방법)

구분	사 업 명	사업비 (천원)	업체명	기간	사 업 내 용	계약 방법
계	30건	479,423
설계용역	명상숲 조성사업 실시설계용역	18,627	㈜우향이앤씨	20.1.9. ~20.2.27.	명상숲 8개소 실시설계	수의 계약
설계용역	명품가로숲길 조성사업 실시설계 용역	17,663	㈜우향이앤씨	20.1.14. ~20.2.22.	모현동, 어양동 명품가로숲길 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	가로화단 정비사업 실시설계 용역	5,790	㈜주한건설 기술단	20.1.20. ~20.2.18.	1공단 가로화단 정비사업, 2공단 가로화단 관목 식재사업 실시설계	수의 계약
설계용역	가로수 조성사업 실시설계 용역	11,088	(주)우향이앤씨	20.1.28. ~20.2.26.	706지방도, 국도26호선 가로수 정비사업 실시설계	수의 계약
설계용역	복지시설 나눔숲(실외) 조성사업 실시설계 용역	6,874	㈜우향이앤씨	20.1.28. ~20.3.17.	복지시설나눔숲(실외) 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	어린이공원 리모델링사업 실시설계 용역	20,030	㈜태원 엔지니어링	20.1.30. ~20.4.28.	백제, 동초어린이공원 리모델링사업 실시설계	수의 계약
설계용역	500만 그루 나무심기 (유휴부지)사업 실시설계 용역	4,140	㈜태원 엔지니어링	20.2.3. ~20.3.13.	500만 그루 나무심기 (유휴부지)사업 실시설계	수의 계약
설계용역	띠녹지 조성사업 실시설계 용역	5,800	㈜주한건설 기술단	20.2.6. ~20.2.25.	선화로, 무왕로 띠녹지 조성사업 실시설계	수의 계약
일반 용역	익산 공원조성계획 결정 용역 (제2호 수변공원)	35,183	㈜유현이엔씨	20.2.20. ~20.12.18.	구)농촌진흥원 부지 공원 조성계획 결정 (제2호 수변공원)	공개경쟁
감리 용역	명품가로숲길 조성사업 감리용역	10,252	한솔산림기술사 사무소	20.2.27. ~20.7.25.	모현동, 어양동 명품가로숲길 조성사업 감리	수의 계약
감리 용역	복지시설 나눔숲(실외) 조성사업 감리 용역	4,343	한솔산림기술사사무소	20.3.6. ~20.8.2.	복지시설나눔숲(실외) 조성사업 감리	수의 계약
폐기물 용역	상반기 임목폐기물 처리용역	15,579	(유)해머	20.3.16. ~20.4.4.	임목폐기물 200ton 처리	수의 계약
폐기물 용역	1공단 가로화단 정비사업 건설폐기물 처리용역	7,714	㈜일진 도시환경	20.3.16. ~20.5.7.	건설폐기물 251ton 처리	수의 계약
감리 용역	가로수 조성사업 감리용역	6,518	(유)제이비 기술공사	20.3.18. ~20.6.11.	706지방도, 국도26호선 가로수 정비사업 감리	수의 계약
학술 용역	황등공원 조성사업 문화재지표조사 용역	3,850	원광대학교 산학협력단 마한백제 문화연구소	20.3.19. ~20.4.2.	「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제6조에 따른 문화재 지표조사	수의 계약
감리 용역	가로화단 정비 및 띠녹지 조성사업 감리용역	6,200	(유)윤이엔지	20.3.24. ~20.5.19.	가로화단 정비 및 띠녹지 조성사업 감리	수의 계약
폐기물 용역	망성면 축사부지 지장물 철거사업 건설폐기물처리용역	11,078	(유)가나환경	20.3.26. ~20.4.2.	건설폐기물 347ton 처리	수의 계약
폐기물 용역	모현동 명품가로숲길 조성사업 폐기물 처리용역	22,727	(주)상현환경	20.4.9. ~20.6.7.	폐콘크리트 197ton, 건설폐기물 228ton, 혼합건설폐기물 1ton 처리	공개경쟁
폐기물 용역	어양동 명품가로숲길 조성사업 폐기물 처리용역	26,804	(유)다일 환경산업	20.4.9. ~20.6.7.	폐콘크리트 295ton, 건설폐기물 234ton, 혼합건설폐기물 5ton 처리	공개경쟁
설계용역	도시숲 조성사업 실시설계 용역	22,936	㈜한가람	20.4.10 ~20.7.18.	모현동 외 2개소 도시숲 조성사업 실시설계	공개경쟁
폐기물 용역	706지방도 가로수 정비사업 폐기물 처리용역	14,088	(유)해머	20.4.14. ~20.6.12.	임목폐기물 144ton 혼합건설폐기물 15ton 처리	수의 계약
설계용역	수변경관 도시숲 조성 실시설계 용역	11,702	㈜태원 엔지니어링	20.5.6. ~20.8.13.	동산동 수변경관 도시숲 조성 실시설계	수의 계약
폐기물 용역	하반기 임목폐기물 처리용역	17,736	(유)해머	20.7.13. ~20.8.1.	임목폐기물 230ton 처리	수의 계약
설계용역	가을철 명품가로숲길 조성사업 실시설계 용역	11,070	(주)우향이앤씨	20.8.20. ~20.9.28.	가을철 모현동, 어양동 명품가로숲길 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	호남고속국도 미세먼지 차단숲 실시설계 용역	58,787	(유)홍운 엔지니어링	20.9.14. ~20.12.22.	호남고속국도 미세먼지 차단숲 실시설계	공개경쟁
일반 용역	어린이놀이시설 모래소독 용역	16,488	(유)현대 그린환경	20.9.25. ~20.11.13.	장미공원 등 21개소(5,106㎡)	수의 계약
설계용역	국가식품클러스터 미세먼지 차단숲 실시설계 용역	57,137	(유)홍운 엔지니어링	20.10.5. ~21.1.12.	국가식품클러스터 미세먼지 차단숲 실시설계	공개경쟁
폐기물 용역	2020년 하반기 임목폐기물 처리용역	9,800	(유)해머	20.10.23. ~20.11.11.	임목폐기물 120ton 처리	수의 계약
감리 용역	도시숲 조성사업 감리 용역	12,742	산림조합중앙회전북지역본부	20.10.26. ~공사중지	모현동 외 3개소 도시숲 조성사업 감리 (완료 – 모현동, 동산동, 수변경관 도시숲 조성, 사고이월 - 익산국가산업단지 도시숲 조성)	수의 계약
폐기물 용역	가을철 어양동 명품가로숲길 조성사업 폐기물 처리용역	6,677	(유)다일 환경산업	20.11.3. ~20.12.12.	폐콘크리트 7ton, 건설폐기물 96ton, 혼합건설폐기물 1ton 처리	수의 계약

□ 용역비 미집행 사업 추진 현황

해    당    없    음

□ 용역사업 중 사전 기술심사를 하여 참가자격 제한 사례

해    당    없    음

□ 각종 용역사업 중 실제사업에 적용시키지 못하고 사장하고 있는 용역현황

해    당    없    음

□ 각종 용역 사업 중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례

해    당    없    음

13. 인․허가 민원처리 관련 사항

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□

(단위:천원)

일자	사업명	당초	변경	계약자	증△감	공 사 기 간	변 경 사 유
3.6.	망성면 폐축사 및 지장물 철거사업	25,574	29,919	㈜한백건설	4,345	19.10.25. ~20.3.20.	·현장여건에 따른 철거 및 폐기물 처리량 증가
4.17.	함열여중 명상숲 조성사업	53,000	54,028	(유)수영	1,028	20.3.24. ~20.5.2.	·현장여건을 반영하여 자연석 판석 수량 증가
4.22.	이리중앙초 명상숲 조성사업	39,958	37,246	(유)하늘 조경건설	△2,712	20.3.26. ~20.5.4.	·현장여건을 반영하여 흙치환 물량 감소
4.24.	선화로 띠녹지 조성사업	84,589	80,570	㈜두성 조경	△4,019	20.3.12. ~20.4.30.	·현장여건을 반영하여 띠녹지 조성구간 감소
4.28.	1공단 가로화단 정비사업	82,757	86,349	(유)효동 건설	3,592	20.3.12. ~20.4.30.	·현장여건을 반영하여 기존화단 철거물량 증가
4.29.	500만 그루 나무심기 유휴부지 (전북대 특성화캠퍼스) 수목식재사업	100,145	103,566	(유)수영	3,421	20.4.6. ~20.5.5.	·현장여건을 반영하여 관목 추가식재, 배수를 위한 토사 반입
4.29.	무궁화 도시숲 조성사업	76,836	80,283	(유)은산	3,448	20.4.7. ~20.5.6.	·현장여건을 반영하여관목 이식수량 증가, 거푸집 및 골재 증가
5.1.	무왕로 띠녹지 조성사업	61,812	58,176	(유)연정조경건설	△3,636	20.3.16. ~20.5.4.	·현장여건을 반영하여 띠녹지 조성구간 감소
5.6.	시온육아원 복지시설 나눔숲 (실외)조성사업	170,614	182,615	(유)수민건설	12,001	20.4.2. ~20.5.11.	·현장여건을 반영하여 배수공 추가, 잔디블럭포장 면적 증가
6.15.	706지방도 가로수 정비사업	243,111	228,748	(유)한울	△14,363	20.4.6. ~20.6.4.	·현장여건을 반영하여 녹지조성 면적 감 ·각종 보험료 준공정산
6.23.	모현동 명품가로숲길 조성사업	264,631	247,516	(유)그린 웍스	△17,115	20.4.3. ~20.6.24.	·경찰서 협의 후 교차로 부분 시야 방해 우려 지역 녹지조성 면적 감소
6.24.	어양동 명품가로숲길 조성사업	260,437	254,360	(유)상선	△6,077	20.4.3. ~20.6.16.	·현장여건을 반영하여 녹지조성 면적 감소, ·각종 보험료 준공정산
7.21.	백제어린이공원 리모델링사업	90,524	85,100	㈜개성토건	△5,424	20.5.29. ~20.7.27.	·현장여건에 따른 철거 및 폐기물 처리량 감소
10.29.	동초어린이공원 리모델링사업	192,589	194,722	(유)성우 토건	2,133	20.5.22. ~20.11.5.	·민원발생에 따른 공사물량 변경(잔디떼붙임, 경계석 교체 등)
11.2.	대규모도시숲 조성사업 (2차)	761,720	887,278	익산산림조합	125,558	19.9.4. ~20.11.6.	·안정성 확보에 따른 자연석 쌓기, 데크 설치, 포장 경계석 증가 ·민원에 따른 수목식재 증가
11.16.	명상숲 조성지 초화류(구근) 식재사업	41,527	46,831	㈜두성 조경	5,304	20.11.3. ~20.12.12.	·현장 여건 반영하여 초화류 수량 증가
12.4.	가을철 모현동 명품가로숲길 조성사업	67,051	64,843	(유)수영	△2,208	20.10.28. ~20.12.6.	·현장 여건 반영하여 조성면적 감소
12.8.	동산동 도시숲 조성사업	120,416	119,157	(유)여원조경개발	△1,259	20.10.12. ~20.12.10.	·현장여건을 반영하여 앉음벽 감소, 경관조명 기초 추가
12.9.	모현동 도시숲 조성사업	107,583	117,988	㈜내담 건설	10,405	20.10.14. ~20.12.12.	·현장여건을 반영하여 관목 식재수량 증가, 경관조명 기초추가
12.9.	익산국가산업단지 도시숲 조성사업	227,081	251,503	익산산림조합	24,422	20.10.20. ~공사중지	·현장여건을 반영하여 자연석 쌓기, 맹암거 설치 추가
12.15.	수변경관 도시숲 조성사업	302,281	339,527	익산산림조합	37,246	20.10.20. ~20.12.18.	·현장여건을 반영하여 마사토 성토, 관목류 식재수량 증가

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

(단위:천원)

사 업 명	사 업 개 요	사업기간	사업비	진도 (%)
계	35건		4,321,468
2020년 공원(녹지) 수목식재 사업	배산휴먼공원 외 5개소 이팝나무 168주 식재	20.2.26. ~20.4.25.	42,504	100
1공단 가로화단 정비사업	회양목 11,120주 식재	20.3.12. ~20.4.30.	86,349	100
2공단 가로화단 관목식재사업	영산홍 14,663주 식재	20.3.12. ~20.4.30.	87,680	100
선화로 띠녹지 조성사업	회양목 등 2종 9,456주 식재	20.3.12. ~20.4.30.	80,570	100
무왕로 띠녹지 조성사업	회양목 등 2종 6,210주 식재	20.3.16. ~20.5.4.	58,176	100
이리중앙초 명상숲 조성사업	배롱, 이팝나무 2주, 수수꽃다리, 화살나무 등 관목 4종 3,190주	20.3.26. ~20.5.4.	37,246	100
이리초 명상숲 조성사업	소나무, 청단풍 등 27주, 남천, 영산홍 등 관목 4종 1,560주	20.3.26. ~20.5.4.	50,152	100
이리중 명상숲 조성사업	소나무, 배롱나무 등 25주, 남천, 화살나무 등 관목 4종 1,250주	20.3.26. ~20.5.4.	50,270	100
오산남초 명상숲 조성사업	상수리, 자작나무 등 34주, 남천, 수수꽃다리 등 관목 4종 2,120주	20.3.26. ~20.5.4.	51,948	100
함열여중 명상숲 조성사업	소나무, 배롱나무 등 32주, 남천, 수수꽃다리 등 관목 5종 1,220주	20.3.24. ~20.5.2.	54,028	100
용안초 명상숲 조성사업	소나무, 배롱나무 등 27주, 남천, 영산홍 등 관목 4종 1,910주	20.3.26. ~20.5.4.	49,910	100
여산초 명상숲 조성사업	소나무, 청단풍 등 23주, 남천, 화살나무 등 관목 4종 2,250주	20.3.25. ~20.5.3.	50,643	100
성북초 명상숲 조성사업	소나무, 배롱나무 등 18주, 남천, 불두화 등 관목 6종 2,050주	20.3.26. ~20.5.4.	50,078	100
1공단 관목 식재사업	영산홍 12,000주 식재	20.3.30. ~20.4.28.	70,171	100
시온육아원 복지시설 나눔숲(실외) 조성사업	소나무 등 교목 11종 91주, 화살나무 등 관목 9종 4,010주 등 식재	20.4.2. ~20.5.11.	182,615	100
모현동 명품가로숲길 조성사업	느티나무 등 4종 7,520주 식재	20.4.3. ~20.7.1.	247,516	100
어양동 명품가로숲길 조성사업	청단풍 등 15종 6,826주 식재	20.4.3. ~20.7.1.	254,360	100
706 지방도 가로수 정비사업	왕벚나무 식재 380주, 전정 884주	20.4.6. ~20.6.4.	228,748	100
500만 그루 나무심기 유휴부지(전북대특성화캠퍼스) 수목식재사업	느티나무 등 교목 33주, 남천 등 관목 2,860주 식재	20.4.6. ~20.5.15.	103,566	100
무궁화 도시숲 조성사업	무궁화 1,672주, 회양목 985주 식재, 흙콘크리트 300㎡ 등	20.4.7. ~20.5.6.	80,283	100
국도26호선 가로수 정비사업	왕벚나무 전정 241주	20.4.13. ~20.5.11.	37,554	100
공원설치용 이동식화장실 구입 설치 사업	목천공원 이동식 화장실 1조 설치	20.5.14. ~20.7.31.	49,227	100
동초어린이공원 리모델링사업	생태놀이터 시설물 설치(모래포설, 오름놀이대, 조합놀이대, 통나무징검다리 등)	20.5.22. ~20.11.5.	194,722	100
백제어린이공원 리모델링사업	생태놀이터 시설물 설치(모래포설, 통나무징검다리, 바구니그네, 통과놀이대 설치 등)	20.5.29. ~20.7.27.	85,100	100
2020년 제3산업단지 녹지 예초사업	예초 및 풀모으기, 제거 143,433㎡	20.6.15. ~20.8.13.	59,307	100
내 나무심기 운동 시민의 숲 토양개량사업	토양개량(T500, 배합비율 1:20) 3,000㎡ 등	20.6.19. ~20.7.8.	37,104	100
대규모 도시숲 조성사업(2차)	교목 14종 297주, 관목 12종 10,153주, 지피 6종 1,900본. 잔디 8,463㎡ 식재 등	19.9.4. ~20.11.6.	887,278	100
2020년 제3산업단지 녹지 및 함열농공단지 예초사업	예초 164,994㎡	20.9.25. ~20.11.23.	48,660	100
동산동 도시숲 조성사업 (동신아파트 뒤)	소나무, 황금사철 등 22종 4,125주 식재, 인조화강설블럭 포장 227㎡ 등	20.10.12. ~20.12.10.	119,157	100
모현동 도시숲 조성사업 (신기마을 입구)	이팝나무, 화살나무 등 21종 5,014주 식재, 통석앉음벽 1개소, 파고라 1식 설치 등	20.10.14. ~20.12.12.	117,988	100
수변경관 도시숲 조성사업	팥배나무, 배롱나무 등 12,803주 식재	20.10.20. ~20.12.18.	339,527	100
익산국가산업단지 도시숲 조성사업	소나무, 회양목 등 27종 8,357주 식재, 인조화강설블럭포장 540㎡, 디딤석 포장 47㎡, 맹암거 설치 201m 등	20.10.20. ~공사중지	251,503	20
가을철 어양동 명품가로숲길 조성사업	영산홍 등 3종 5,092주 식재	20.10.27. ~20.12.5.	65,854	100
가을철 모현동 명품가로숲길 조성사업	이팝나무 등 5종 3,766주 식재	20.10.28. ~20.12.6.	64,843	100
명상숲 조성지 초화류 식재사업	수선화, 튤립등 초화류 구근 24,300본 식재	20.11.3. ~20.12.12.	46,831	100

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

(단위:천원)

보조사업자명	지원액	집행액	집행내역	지원근거	비고
계	130,832	130,832
수목원 코디네이터	20,832	20,832	수목원 코디네이터 인건비	수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률
(사)푸른익산 가꾸기운동본부	110,000	110,000	(사)푸른익산가꾸기 운동본부 인건비 및 사업비	푸른익산 만들기 운동 육성 및 지원 조례

□ 사업계획서 및 정산서 사본 : 별 첨

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액				집행액	비율 (%)
	계	국비	도비	시비
계	3,603,241	361,620.5	1,540,000	1,701,620.5	3,388,955	99.93
도시숲조성사업 (가로수조성)(전환사업)	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100
도시숲조성사업 (명상숲조성)(전환사업)	480,000	0	240,000	240,000	480,000	100
도시숲조성사업 (도시숲조성)(전환사업)	1,000,000	0	500,000	500,000	785,714	78.6
녹색자금지원사업	200,000	0	200,000	0	200,000	100
대규모 도시숲 조성사업(2차)	723,241	361,620.5	0	361,620.5	723,241	100

18. 2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	공원조성계장		진준용	□

(단위:천원)

사 업 명	이 월 액	집 행 액	잔 액	비고
계	807,796	807,796	0
대규모 도시숲 조성사업(2차)	723,241	723,241	0	명시
망성면 농촌형 주민힐링공원 조성사업	84,555	84,555	0	명시

19. 2021년도 명시이월 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

20. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

21. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

22. 국․도비예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

23. 국․도비 반납 현황 및 사유

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 2020년도 반납완료

(단위:천원)

사 업 명	예산액	지출액	반 납 액				반납사유	비고
			계	국비	도비	시비
계	1,180,592	1,174,310	6,282	381	2,913	2,988
2019년 생활권 수목진료 지원	5,000	4,750	250	125	38	87	낙찰차액	국ㆍ도비
2019년 산림 서비스도우미	40,592	40,590	2	1	-	1	인건비 잔액	국․도비
2019년 미세먼지 차단숲 조성사업	1,000,000	999,490	510	255	-	255	폐기물 처리비 정산	국비
2019년 녹색일자리확충	16,000	15,962	38	-	11	27	인건비 잔액	도비
2019년 지역밀착형 참여사업(공원)	84,000	80,861	3,139	-	2,197	942	낙찰차액	도비
2019년 공원녹지 시설유지관리(보조)	35,000	32,657	2,343	-	667	1,676	낙찰차액	도비

□ 2021년도 반납예정

(단위:천원)

사 업 명	예산액	지출액	반 납 액				반납사유	비고
			계	국비	도비	시비
계	642,993	640,564	2,429	196	1,676	557
2020년 생활권 수목진료 지원	6,249	5,936	313	157	47	109	낙찰차액	국ㆍ도비
2020년 산림 서비스도우미	41,664	41,663	1	1	-	-	인건비 잔액	국ㆍ도비
2020년 미세먼지 차단숲 조성사업	116,000	115,924	76	38	-	38	집행잔액	국비
2020년 녹색일자리확충	16,480	16,475	5	-	1	4	인건비 잔액	도비
2020년 공원정비 (주민참여예산)	106,000	103,966	2,034	-	1,628	406	낙찰차액	도비

24. 2020년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

25. 2020년도 계획사업 중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

26. 2020년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

27. 2020년도 예산 편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

28. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

29. 소송 사건 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

30. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		진준용	□
		공원관리계장		김진형	□

구 분	접 수 건 수	처 리 건 수	비 고
계	65	65
도시숲 유지관리	2	2
가로수 유지관리	12	12
공원계획 및 조성 관련	6	6
공원녹지 시설 유지관리	33	33
공원녹지 수목 유지관리	12	12

31. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

32. 의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

33. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

34. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

35. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

해 당 없 음

36. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	가로수환경계장		이미란	□

협약명	체결일자	대상	예산수반 여부	주요내용 (재정지원 등)	비고
500만그루 나무심기 사업 협약	2020.2.10.	한국농어촌공사 익산지사장	부	농어촌공사 익산지사 유휴부지(대간선수로 내) 수목식재 추진

과 요구사항

1. 가로수 조성 및 관리

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	가로수환경계장		이미란	□

□ 사 업 개 요

◦ 위     치

▸ 가로수 조성 및 화단 정비 외 1개사업     : 706지방도, 번영로, 선화로 등 6.5㎞

▸ 가로수 유지관리                         : 하나로 등 120개 노선 340㎞

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,076백만원(도비 200, 시비 876)

◦ 사업내용 : 가로수 조성, 화단 정비 및 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 가로수 조성 및 가로화단 정비사업         : 5개 사업 490백만원

▸ 706지방도 가로수 정비사업(3㎞)           : 왕벚 380주 식재, 전지 884주/260백만원

▸ 국도 26호선 가로수 정비사업(2㎞)         : 왕벚 전지 241주/37백만원

▸ 1공단 가로화단 정비사업 외 2개사업(2.8㎞)   : 회양목 등 2종 53,449주/193백만원

◦ 가로수 보식	: 5개 사업 55백만원

▸ 배롱나무 보식사업 외 4개사업	: 배롱 등 6종 162주/55백만원

◦ 가로수 전지사업	: 10개 사업 166백만원

▸ 동천로 메타세콰이아 가로수 전지사업 외 9개사업 : 1,277주/ 166백만원

◦ 가로수 유지관리(인건비 및 재료비 등)    : 172백만원

▸ 가로수 가지치기, 수벽전정, 예취 및 풀매기 등

□ 향 후 계 획

◦ 지속적인 가로수 관리를 통한 안전하고 아름다운 도시경관 창출

2. 명품가로숲길 조성사업 추진현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	가로수환경계장		이미란	□

□ 사 업 개 요

◦ 위     치

▸ 명품가로숲길 조성

위 치	연장(㎞)	봄철	가을철
합 계	2.0	0.8㎞	1.2㎞
모현동	1.1	익산경찰서~선치과, L=0.5㎞	필스토리의원~원광여중, L=0.6㎞
어양동	0.9	동남＠~e편한세상＠, L=0.3㎞	쌍용＠~하나로사거리, L=0.6㎞

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 800백만원(도비 400, 시비 400)

◦ 사업내용 : 명품가로숲길 조성 및 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 봄철 명품가로숲길 조성사업	: 2020. 4.~6.

▸ 모현동(익산경찰서~선치과 0.5㎞) 느티나무 등 4종 7,520주 식재 등

▸ 어양동(동남＠~e편한세상＠ 0.3㎞) 청단풍 등 15종 6,826주 식재 등

◦ 가을철 명품가로숲길 조성사업                             : 2020. 10.~11.

▸ 모현동(필스토리의원~원광여중, 0.6㎞) 이팝나무 등 5종 3,766주 식재 등

▸ 어양동(쌍용＠~하나로사거리, 0.6㎞) 영산홍 등 3종 5,092주 식재 등

◦ 명품가로숲길 유지관리	: 2020. 6.~12.

▸ 급수작업 및 환경정비(예초 및 풀매기 등)

□ 향 후 계 획

◦ 명품가로숲길 조성으로 녹지공간 확보 및 특색있고 아름다운 가로경관 창출

3. 꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기사업 추진실적

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산대로 등 주요도로변, 교통섬 등

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 586백만원(인건비 457, 재료비 87, 자산취득비 5, 운영비 37)

◦ 사업내용

▸ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진

▸ 특화거리 및 꽃길조성, 각종 축제지원, 계절별 꽃 생산 및 식재

□ 추 진 실 적

◦ 계절별 꽃 생산 및 식재	: 2020.3.~12.

▸ 내    용 : 팬지 등 10종 100만 본 양묘 및 식재

◦ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진(3회: 3월, 7월, 9월)

▸ 내    용 : 계절별 3회 기관 및 학교(총 540개소) 초화류 21만 본 지원

◦ 자연친화 감성 꽃거리 및 꽃밭조성	: 2020.3.~10.

▸ 시 경계 진입로 등 5개소 30㎞, 교통섬 11개소, 걸이화분 1,085개 꽃식재

▸ 전북대학교 특성화 캠퍼스 내 5,000㎡ 꽃밭조성 / 메리골드 등 6종 6만본

◦ 겨울꽃(꽃배추 1만본), 2021년 봄꽃(30만본) 육묘	: 2020.11.~12.

□ 향 후 계 획

◦ 지속적인 꽃 생산 및 꽃길조성 사업 추진

4. 500만 그루 나무심기 사업 추진현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	푸른숲조성계장		정선희	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 가로변, 공원, 완충녹지, 유휴토지, 학교 등 도심 전역

◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2023.(5개년)

◦ 사 업 비 : 36,321백만원(국비 5,807, 도비 6,586 시비 23,928)

◦ 사업규모 : 505만 그루(공공 481만, 민간 24만)

◦ 내    용 : 도시숲 등 수목 식재, 시민과 함께하는 나무심기 등

◦ 연도별 식재 계획                                               (단위:주)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	계
계	418,114	508,040	600,386	1,414,352	2,110,789	5,051,681
공공부문	358,659	454,560	559,708	1,350,305	2,092,424	4,815,656
민간부문	59,455	53,480	40,678	64,047	18,365	236,025

▸ ‘19~’20년 식재 실적 : 1,152,322주 (공공 1,006,608, 민간 145,714)

□ 추 진 실 적

◦ 2020년 수목식재 추진(734,208주)	:2020. 2.~12.

구 분	목 표	식재완료(주)	달성률(%)
합 계	508,040	734,208	144.5
공공부문 사업추진	454,560	647,949	142.5
민간부문 사업추진	53,480	86,259	161.3

◦ 2020년 나무 나누어주기 추진(27,680주)

▸ 공동체 나무 나누어주기 - 영산홍 등 5종 20,680주	: 2020.10.16.

▸ 시민참여 나무 나누어주기 - 감나무 등 6종 7,000주	: 2020.10.30.

◦ 내 나무심기(재난위기극복의 숲) 추진(850주)

▸ 23개 단체 ㆍ 시민 512명 참여 / 소나무 등 15종 850주 식재

□ 향 후 계 획

◦ 500만 그루 나무심기 사업 지속 추진	: 2021.~2023.

◦ 500만 그루 나무심기 수목 등 유지관리	: 계속

5. 인화공원 조성사업 추진 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	공원조성계장		진준용	□

□ 사 업 개 요

◦ 명    칭 : 인화근린공원(전라북도 고시 제2017-165호(2017.8.18.))

◦ 위    치 : 구)동익산역 ~ 춘포역(공원결정면적 A=137,816㎡, L=4.8㎞)

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2022.

◦ 사 업 비 : 5,737백만원(국비 1,628, 도비 1,090, 시비 2,719, 기금 300)

▸ 2020년 예산(명시이월) : 723백만원(국비 361.5, 시비 361.5)

◦ 내    용 : 인화공원 단계별 조성(A=71,300㎡)

▸ 1단계 - 남부권 나눔숲(A=6,000㎡)                    : 2016. ~ 2017.

▸ 2단계 - 다기능 힐링공원(A=10,000㎡), 명품 가로숲길(A=3,800㎡)

공공시설 여성화장실 확충(A=69㎡)            : 2018. ~ 2019.

▸ 3단계 - 대규모 도시숲 1차(A=11,300㎡)                  : 2018. ~ 2019.

▸ 4단계 - 대규모 도시숲 2차(A=15,000㎡)                 : 2019. ~ 2020.

▸ 5단계 - 메타세쿼이아길 무장애나눔길(A=25,200㎡)   : 2021. ~ 2022.

□ 추 진 실 적

◦ 대규모 도시숲 조성사업(2차) 시행(A=15,000㎡)	: 2019. 9.~2020. 11.

◦ 무장애나눔길 조성사업(L=1.3㎞, B=6m) 공모선정(667백만원) : 2020. 12.

□ 향 후 계 획

◦ 메타세쿼이아길 조성사업(L=4.2㎞, B=6m) 추진	: 2021. ~ 2022.

▸ 무장애나눔길 조성사업(L=1.3㎞, B=6m)                      : 2021.

▸ 무장애나눔길 조성사업(L=2.9㎞, B=6m)                      : 2022.

6. 도시공원 및 녹지관리 추진 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		유은미	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□

□ 관 리 현 황

◦ 대    상 : 148개소 355ha(공원 80개소 314ha, 녹지 68개소 41ha)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,991백만원(시설관리 1,144, 수목관리 847)

◦ 사업내용 : 공원시설물 설치 및 유지보수, 수목 식재 및 관리

□ 추 진 실 적

◦ 공원(녹지) 시설물 설치 및 유지관리

▸ 운동기구(29개), 의자(86개), 퍼걸러(8개), 쉼터(1개), 흙먼지털이기(1개)

▸ 공원등주 설치 : 고래등공원 외 5개소, 14주

▸ 공원 내 화장실 설치 및 산책로 탄성포장 : 목천공원, 416㎡

▸ 시설물 보수(의자, 운동기구, 화장실, 기타시설) : 목천공원 외 76개소

◦ 공원시설 안전점검

▸ 어린이놀이터 안전관리 : 안전점검 39개소(12회), 정기검사(15개소)

▸ 어린이놀이터 모래소독 : 장미공원 등 21개소(5,106㎡)

▸ 공원 내 공중화장실 불법 촬영 카메라 점검 : 52개소(자체점검 12회, 합동점검 1회)

▸ 여성화장실 안심비상벨 설치 : 궁동공원 외 29개소

▸ 공원 전기시설 안전진단(한국전기안전공사) : 약촌공원 외 83개소

◦ 공원(녹지) 수목 식재 및 유지관리

▸ 수목 및 초화류 식재 : 이팝나무 외 6종 54,776주, 코스모스 1.5㎞(모현공원 외 11개소)

▸ 수목전지작업 : 소나무 외 2종 170주(백제공원 외 9개소)

▸ 수목병해충방제, 가지치기, 지주목 정비, 예초 및 제초 : 수시 시행

◦ 공원(녹지) 환경 및 시설정비

▸ 기간제근로자(9명) 사역하여 화장실(52개소) 및 산책로 등 청소

□ 향 후 계 획

◦ 안전하고 쾌적한 관리로 공원환경 개선