2021. 5.

제235회 익산시의회(1차 정례회)

2021 행정사무감사

	경제관광국

역사문화재과

	□		감사자료 과 공통사항
		1.		2020 업무성과 및 반성	………	301
		2.		2020 예산집행 및 추진사항	………	303
		3.		2020 행정사무감사 지적사항 및 조치결과	………	307
		4.		2020 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치결과	………	309
		5.		5분 자유발언 조치결과	………	309
		6.		시정질문 조치결과	………	310
		7.		의원 발의 조례 제·개정 후 추진현황	………	310
		8.		주요사업 조서(3천만원 이상)	………	311
		9.		2020 각종 민원(진정,건의,청원 등) 접수 처리내역	………	317
		10.		기금 운용 관련 사항	………	317
		11.		위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	………	318
		12.		용역사업관련	………	322
		13.		인․허가 민원처리 관련사항	………	325
		14.		각종공사 설계 변경상황	………	326
		15.		건설공사 집행 현황(3천만원이상)	………	331
		16.		민간에 대한 보조금 집행내역	………	335
		17.		국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	………	338
		18.		2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역	………	341
		19.		2021년도 명시이월 내역	………	343
		20.		예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황	………	344
		21.		공사 준공기한 연장내역	………	345
		22.		국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	………	345
		23.		국․도비반납현황 및 사유(2020년도 반납건)	………	346
		24.		2020년도 계획사업중 미착공사업 현황	………	349
		25.		2020년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	349
		26.		2020년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	349
		27.		2020년도 예산편성후 전액 미집행 내역	………	349

			28.		예산편성목과 다르게 집행된 예산현황		………	350
			29.		소송사건 현황		………	350
			30.		시홈페이지 접수 민원처리 실태현황		………	351
			31.		시설·사무 민간위탁 현황		………	355
			32.		의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과		………	355
			33.		공유재산관리계획 승인에 대한 건별 집행 현황		………	356
			34.		진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황		………	356
			35.		시 산하 재단 설립 현황		………	356
			36.		업무협약(MOU) 등 체결 현황		………	357
	□		감사자료 과 요구사항
				1.		익산 역사문화도시 조성 추진실적	………	361
				2.		세계유산 보존 관리 추진실적	………	362
				3.		세계유산 활용 홍보 추진실적	………	363
				4.		백제세계유산센터 연계사업 추진실적	………	364
				5.		익산 고도보존육성사업 추진실적	………	365
				6.		문화유산 보존관리(정비) 추진실적	………	366
				7.		백제왕궁(왕궁리유적) 보수정비 추진실적	………	368
				8.		미륵사지 보수정비 추진실적	………	369
				9.		문화재 활용사업 추진실적	………	370
				10.		국립익산박물관 건립사업 추진실적	………	371
				11.		백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성사업 추진실적	………	372
				12.		국가무형문화재통합전수교육관 운영 및 관리 현황	………	373
				13.		국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업 추진실적	………	374
				14.		세계유산 탐방거점 건립사업 추진실적	………	375
				15.		황등제 제방 확인 시□발굴 조사 추진실적	………	376
				16.		서동생가터 역사공원 조성사업 추진실적	………	377

감사자료 과 공통사항

1. 2020 업무성과 및 반성

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

▣ 성      과

◦ 역사문화도시 조성 추진

▸고도 익산의 정체성 확립을 위한 학술회의 개최

▸법정문화도시 예비도시 선정(2020.12.24.)

▸익산 역사문화 고문서 발간(용안현·여산부읍지, 함열현읍지)

◦ 2021년 문화재청 공모사업 선정(7건 / 3,283백만원)

▸지역문화재 활용사업 2건(문화재 야행사업, 향교․서원 문화재 활용사업)

▸세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)

▸세계유산 활용 프로그램 사업(백제역사유적지구)

▸세계유산 활용 콘텐츠 구축(미디어파사드)

▸세계유산축전(백제역사유적지구)

▸무형문화재 전수교육관 활성화 사업(1건/30백만원)

◦ 문화재활용 콘텐츠 개발 및 프로그램 운영

▸익산 문화재야행(1회/10,000여명)

▸향교․서원 문화재 활용사업(22회/565명), 생생문화재 사업(19회/485명)

▸세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프(8회/415명)

▸백제왕궁 소원등 날리기(1회/800여명)

▸백제왕궁 토요 야간상설공연(12회/1,200여명)

▸박물관을 품은 미륵사지(44회/7,786명)

▸드론을 활용한 역사체험 프로그램(20회/275명)

▸지역문화유산 교육사업(34회/819명)

◦ 무형문화재 향유프로그램 지속 및 활성화

▸무형문화재 상설공연 및 공개행사 추진(단체 5 / 개인 2)

▸무형문화재 전수교육 육성 (5개단체/20개 종목/324명)

◦ 고도보존육성사업 추진

▸고도이미지찾기사업 : 107건(한옥 59건 / 담장 48건)

▸이주단지 고도이미지찾기사업 : 26건(한옥 14건 / 담장 12건)

▸고도지구 1~4단계별 간판정비사업 완료(고도길, 금마길 203개소)

▸금마 고도가로경관개선(보차도정비 및 전선지중화, 공공시설물 정비) 완료

▸익산 향교 일원 인도(가로변)정비사업 완료

▸한샘 정비사업 추진(실시설계 용역 등 행정절차 추진 중)

▸익산고등학교 담장정비사업 추진(전통담장 및 협문설치, L=220m)

▸금마 고도길 쉼터 조성사업(지적경계측량 완료, 협의 매수 추진 중)

◦ 문화재 보존정비 추진

▸백제왕궁 유적지·후원 정비, 북측관리센터 조성 완료

▸세계유산(미륵사지, 백제왕궁) 경관조명 설치 완료

▸익산 백제왕궁 ICT역사관 조성 공사 착공

▸미륵사지 회랑지 및 북승방지 기단부 정비, 탐방로 정비 완료

▸익산 쌍릉, 토성 종합정비계획 수립

▸익산 토성(성벽 내부) 발굴조사로 백제왕도 정체성 확보

▸도지정 목조문화재 소화시스템 구축 6개소

▸도지정 목조문화재 재난방지시설 구축 12개소

▸익산 솜리 근대역사문화공간 종합정비계획 추진

▸익산쌍릉 정비 등 문화재 보존정비 32건(완료 27건 / 시행중 5건)

◦ 향토유적 신규지정 및 등록(향토유적 2건)

▸익산 광암리 백제토기 가마터(향토유적 제22호)

▸익산 구 안대동 성당터(향토유적 제23호)

▣ 반      성

◦ 문화재 보수정비 문화재청 승인 기간 과다소요로 인한 예산집행률 저조

‣선금, 기성금 등 적극 지급으로 예산 최대한 집행 노력

2. 2020년 예산집행 및 추진사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

(단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액					지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2020 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액	계속비 이월액
역사문화재과				43,645,862	33,195,203	1,970,869	752,530	7,727,260	32,619,305	10,637,836	240,499	148,222	74.7	계속비 7,208,533 명시 3,429,303
	전통문화 보존 및 전승			42,944,774	32,494,115	1,970,869	752,530	7,727,260	31,918,603	10,637,836	240,499	147,836	74.3
		문화재 보존 및 전승		31,118,810	23,412,973	1,691,461	192,530	5,821,846	23,000,332	7,781,629	227,592	109,257	73.9
			문화유적지 보존관리	197,468	197,468	0	0	0	197,209	0	0	259	99.9
			문화유적지 정비	622,360	199,830	230,000	192,530	0	534,551	86,700	0	1,109	85.9	명시
			문화재 운영	32,240	32,240	0	0	0	30,966	0	0	1,274	96.0
			세계유산 보존 관리 사업 (왕궁리유적)	8,541,953	6,209,524	0	0	2,332,429	4,246,063	4,280,866	12,953	2,071	49.7	계속비 참고1
			세계유산 보존 관리 사업 (미륵사지)	8,185,367	5,150,000	0	0	3,035,367	6,392,736	1,783,381	7,862	1,388	78.1	계속비
			국가지정 및 등록문화재 보수정비	10,500,876	9,470,000	1,030,876	0	0	9,305,663	1,090,089	86,978	18,146	88.6	명시
			국가지정 및 등록문화재 보수정비 (제석사지)	454,050	0	0	0	454,050	427,316	0	22,724	4,010	94.1
			도지정 문화재 보수정비	991,000	991,000	0	0	0	679,975	276,875	11,586	22,564	68.6	명시 참고2
			문화재 재난방지시설 구축	360,000	360,000	0	0	0	144,051	163,718	26,964	25,267	40.0	명시 참고3
			문화재 방재시설 유지관리 지원	21,500	21,500	0	0	0	17,656	0	3,037	807	82.1
			문화재 안전경비원 배치 및 활용	84,690	84,690	0	0	0	84,325	0	237	128	99.6
			전통사찰 방재 시스템 유지관리	25,598	25,598	0	0	0	24,318	0	960	320	95.0
			문화재안내판 정비	38,250	38,250	0	0	0	28,601	0	8,048	1,601	74.8
			도지정 목조문화재 재난관리 시스템 구축	92,810	92,810	0	0	0	78,256	0	3,142	11,412	84.3
			전통사찰 편의시설 지원	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	명시 참고4
			향교시설 개선 지원사업	30,000	0	30,000	0	0	28,883	0	335	782	96.3
			문화재 방재IOT시스템	300,000	0	300,000	0	0	256,823	0	34,110	9,067	85.6
			문화재 긴급 보수사업	88,585	0	88,585	0	0	88,190	0	395	0	99.6
			국가무형문화재 통합전수교육관 운영	95,740	95,740	0	0	0	95,604	0	0	136	99.9
			전수교육관 활성화 지원	46,250	46,250	0	0	0	46,250	0	0	0	100
			무형문화재 전수활동비	106,500	106,500	0	0	0	104,000	0	1,000	1,500	97.7
			농악 전승학교 지원	12,000	12,000	0	0	0	5,050	0	2,780	4,170	42.1	참고5
			기예능 보유자 전수지원	148,113	148,113	0	0	0	148,113	0	0	0	100
			전수교육관 문화예술교육사 배치사업	20,000	20,000	0	0	0	12,273	0	4,481	3,246	61.4	참고6
			무형문화재 전수시설 개선 지원사업	23,460	11,460	12,000	0	0	23,460	0	0	0	100
		역사문화도시 조성		3,355,690	3,340,690	15,000	0	0	3,310,667	16,200	12,907	15,916	98.7
			세계유산 보존관리 사업	121,219	106,219	15,000	0	0	117,673	0	0	3,546	97.1
			세계유산 보존관리 사업(백제역사유적지구)	200,000	200,000	0	0	0	199,980	0	17	3	99.9
			세계유산 활용 및 홍보 사업	324,180	324,180	0	0	0	324,145	0	0	35	99.9
			세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)	477,336	477,336	0	0	0	477,336	0	0	0	100
			백제세계유산 센터 운영	266,700	266,700	0	0	0	266,700	0	0	0	100
			백제왕궁 편의시설 운영	12,808	12,808	0	0	0	12,766	0	0	42	99.7
			역사도시 조성	55,000	55,000	0	0	0	35,845	16,200	0	2,955	65.2	명시
			문화특화지역 조성 사업 (전환사업)	820,000	820,000	0	0	0	820,000	0	0	0	100
			문화재 야행사업	327,500	327,500	0	0	0	305,275	0	12,890	9,335	93.2
			문화재 야행사업(자체사업)	79,947	79,947	0	0	0	79,947	0	0	0	100
			향교서원 활용사업	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	100
			생생문화재 활용사업	55,000	55,000	0	0	0	55,000	0	0	0	100
			지역문화유산 교육사업	46,000	46,000	0	0	0	46,000	0	0	0	100
			세계유산 활용 프로그램 사업(백제역사유적지구)	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	100
			국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	100
		고도보존 육성		8,470,274	5,740,452	264,408	560,000	1,905,414	5,607,604	2,840,007	0	22,663	66.2
			고도보존 정비	37,000	37,000	0	0	0	37,000	0	0	0	100
			주민참여 활동지원	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100
			익산고도육성 사업	1,339,290	1,074,882	264,408	0	0	1,195,331	141,302	0	2,657	89.3	명시
			익산고도육성 사업(보조)	1,070,000	1,070,000	0	0	0	1,920	1,068,074	0	6	0.2	명시 참고7
			고도지구 주거환경 및 가로경관 개선 지원	560,000	0	0	560,000	0	540,000	0	0	20,000	96.4
			고도지구 주거환경 및 가로경관 개선 지원(보조)	1,846,090	1,258,570	0	0	587,520	935,856	910,234	0	0	50.7	계속비 참고8
			고도지정지구 육성사업	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1,513,655	486,345	0	0	75.7	명시
			서동생가터 역사공원 조성사업	1,517,894	200,000	0	0	1,317,894	1,283,842	234,052	0	0	84.6	계속비
	재무활동 (역사문화재과)			673,497	673,497	0	0	0	673,486	0	0	11	99.9
		보전지출		673,497	673,497	0	0	0	673,486	0	0	11	99.9
			보전지출	673,497	673,497	0	0	0	673,486	0	0	11	99.9
	행정운영경비 (역사문화재과)			27,591	27,591	0	0	0	27,216	0	0	375	98.6
		기본경비		27,591	27,591	0	0	0	27,216	0	0	375	98.6
			기본경비	27,591	27,591	0	0	0	27,216	0	0	375	98.6

(참고) 2020년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부 진 사 유
1	세계유산 보존관리 사업 (왕궁리유적)	8,541,953	4,246,063	49.7	백제왕궁ICT역사관 준공시기 미도래(2021. 12월)
2	도지정 문화재 보수정비	991,000	679,975	68.6	여산숲정이성지 준공시기 미도래(2021. 2월 완료)
3	문화재 재난방지시설 구축	360,000	144,051	40	동절기부실공사 방지 및 소유자 부재로 인한 공사추진 불가
4	전통사찰 편의시설 지원	100,000	0	0	자명사 편의시설(화장실) 신축 준공시기 미도래(2021. 7월)
5	농악전승학교 지원	12,000	5,050	42.1	코로나 19로 인한 사업 부진
6	전수교육관 문화예술 교육사 배치사업	20,000	12,273	61.4	문화예술교육사 채용 미지원 (1~3차)에 따른 인력배치 지연
7	익산고도육성사업(보조)	1,070,000	1,920	0.2	주민의견 수렴 및 수요조사 이행 및 실시설계 용역 추진(탑리마을)
8	고도지구 주거환경 및 가로경관 개선지원(보조)	1,846,090	935,856	50.7	보조금지원결정 행정절차 이행 및 실시설계 용역 추진

3. 2020행정사무감사 지적사항 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		문화재시설계장		박성일	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•함벽정 편의시설 확충 ▸화장실, 안내판 등의 보수가 잘되어 있으나 탐방객을 위한 물품보관시설 설치, 시설 훼손방지 대책이 필요함.	•조치사항 ▸단계적인 정비를 통해 시설보강 및 보존관리에 철저를 기하겠음. •조치결과 ▸조치사항 : 함벽정 화장실 리모델링 ▸공사기간 : 2020.7.7.~2020.9.15. ▸사 업 비 : 60,198천원
2	•유적지 연계방안 모색 ▸세계유산인 왕궁리 유적과 미륵사지 간 연계가 미흡하여 관리나 관광객 유치에 어려움이 있어 이에 대한 방안을 강구하기 바람.	•조치사항 ▸유적지 연계를 위해 세계유산길이 조성중임. 익산시 구간은 2021년 공사 추진 예정이며, 전북도 해당구간 추진이 미진한 상황임. 도에 적극 건의하여 조속히 추진하겠음. •조치결과 ▸금마↔미륵사지 : 도건의 완료(2021.2.) ▸금마↔백제왕궁 : 도로과 추진중 (2021.12. 완료예정) ▸금마↔익산토성 : 건설과 추진중 (2021.12. 완료예정)
3	•미륵산 등산로 정비와 관련하여 ▸역사문화재과에서 등산로, 벤치, 화장실, 에어건 등 시설물 유지관리업무를 수행하는 것이 합당한지가 의문임. 유지관리부서의 일원화가 필요함.	•조치사항 ▸역사문화재과에서 2006년 국비 확보차원에서 미륵산 등산로를 보수하였으며, 미륵산은 현재 역사문화재과(연수원~정상부근 등산로관리, 별장가든 화장실), 교통행정과(주차장), 산림과(그외 등산로 등)에서 관리하고 있음. 해당부서들과 협의하여 유지관리 일원화 논의하겠음. •조치결과 ▸과학고 측 탐방로 노후 계단 정비 ▸미륵산성 동문지 측 탐방로 포장· 석축·배수로 등 정비 완료

4. 2020 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

감사기간	2020. 5. 18. ～ 5. 22.	감사기관	익산시
지 적 사 항		조 치 결 과
• 민원 이송처리 지연 - 국가지정문화재 현상변경 허가 신청 관련 상급기관 이송 1일 지연		- 신속한 이송을 위해 사전 검토 및 협의를 통해 지연되지 않도록 업무 수행 철저

감사기간	2020. 10. 12. ～ 10. 20.	감사기관	전라북도
지 적 사 항		조 치 결 과
• 익산 왕궁리유적 정비공사 추진 부적정 - 2019년 추진된 사업에서 식재된 구절초에 대하여 고사원인을 규명하고, 그에 따른 대책을 마련하여 보식 등 필요한 조치 시행		- 잦은 강우로 인해 고사된 구절초는 재식재 완료, 조기에 활착될 수 있도록 배수처리 및 관리 철저

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

6. 시정질문 조치결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

연번	질문요지	조치(처리)결과
1	•익산시의 대표축제 육성 및 문화□관광 활성화 모색 ▸“문화재 야행” 확대를 통한 금마□왕궁지역 관광활성화 기대	▸문화재 야행의 확대를 위해 탑리마을 아름다운 주거환경개선사업과 백제왕궁 야간경관 조성, 주차공간정비 등 기반시설을 확충해 나가고 있으며, 2021년 문화재청 공모에 선정되어 추진 중에 있음 ※ 2021년 야행 : 2021. 7. 30. ~ 8. 1. (3일간)

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황(예산, 내용 등)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

8. 주요사업조서(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비	집 행 액	잔 액	집행율 (%)	비고
계	77개 사업	47,308,139	36,611,037	10,697,102	77.4	이월액은 잔액에 포 함
마한 실체 규명을 위한 시·발굴조사	무형리 고분 시·발굴조사	212,000	211,183	817	99.6	완료
익산 황등제 제방 확인 시·발굴조사	황등제 제방 실체 확인을 위한 시·발굴조사	130,000	63,300	66,700	48.7	명시 이월 (~2021.4.)
2018년 왕궁리 유적 정비	발굴조사, 발굴지 정비, 탐방로 정비	3,514,300	3,514,076	224	99.9	완료
2019년 왕궁리 유적 정비	발굴조사, 발굴지 정비, 경관조명 설치	3,071,428	2,507,438	563,990	81.6	계속비 이월 (~2021.12.)
왕궁리 유적 전시관 보수	백제왕궁ICT역사관 보수 설계	700,000	680,298	19,702	97.2	계속비 이월 (~2021.12.)
2020년 왕궁리 유적 정비	발굴지 유적 정비 설계	142,857	87,340	55,517	61.1	계속비 이월 (~2021.12.)
왕궁리유적 북측관리센터 조성	북측관리센터(주차장, 화장실) 조성	700,000	549,006	150,994	78.4	계속비 이월 (~2021.12.)
왕궁리유적 전시관 보수	백제왕궁ICT역사관 조성	5,366,667	1,876,004	3,490,663	35.0	계속비 이월 (~2021.12.)
2018년 미륵사지 정비	복원고증연구, 배수로 및 기단부 정비공사, 탐방로 및 화장실 보수	3,180,000	3,180,000	0	100	완료
2019년 미륵사지 정비	복원고증연구, 건물지 기단부 정비, 광장 전면부 정비, 경관조명등 설치	4,371,429	3,745,641	625,788	85.7	계속비 이월 (~2021.12.)
2020년 미륵사지 정비공사	건물지 기단부 정비	1,000,000	354,539	645,461	35.5	계속비 이월 (~2021.9.)
미륵사지 탐방로 정비 공사	미륵사지 탐방로 정비	450,000	450,000	0	100	완료
미륵사지 가마터 보호각 개보수	조선시대 가마터 보호각 개보수	900,000	499,451	400,549	55.5	계속비 이월 (~2021.12.)
2020년 미륵사지 토지매입	미륵사지 문화재구역 토지매입	1,500,000	1,393,636	106,364	92.9	계속비 이월 (~2021.3.)
미륵사지 복원 고증연구	미륵사 복원정비연구	1,300,000	1,300,000	0	100	완료
제석사지 정비	북승방지 정비	454,050	427,316	26,734	94.1	완료
2019년 익산 쌍릉 정비	발굴지(대왕릉) 유적 정비, 종합정비계획 수립 (문화재구역 55,534㎡)	297,209	277,775	19,434	93.5	완료
익산 쌍릉 정비	발굴지 소왕릉 정비 설계, 토지매입	4,200,000	4,071,130	128,870	96.9	명시 이월 (~2021.4.)
2019년 익산 토성 정비	토성 성벽 내부 추가 발굴지 정비, 종합정비계획 수립 (문화재구역 62,412㎡)	600,000	585,817	14,183	97.6	완료
연안이씨 종중문적 보존 처리 및 보관함 제작	연안이씨 종중문적 보존처리 (18점), 및 보관함(1개) 제작	98,520	83,742	14,778	85.0	완료
익산 숭림사 보광전 주변정비	보광전 전면계단 및 기단(70m), 앞마당 정비(400㎡)	80,000	76,866	3,134	96.1	완료
익산 입점리 고분 전시관 보수	입점리 고분 전시관 지붕 및 내부 마감재 보수(연면적 1,224㎡)	600,000	294,068	305,932	49.0	명시 이월 (~2021.6.)
익산 연동리 석조여래 좌상 정밀실측조사	정밀실측조사	80,000	69,970	10,030	87.5	완료
익산 연동리 석조여래 좌상 불단정비	불단정비(강화유리 불단), 좌대 보존처리 및 3D 스캔	80,000	64,190	15,810	80.2	완료
여산 숲정이순교 성지 주변정비	성토부지 정비 및 조경식재 (2차 / 6,959㎡)	476,000	199,125	276,875	41.8	명시 이월 (~2021.2.)
이병기선생생가 초가이엉잇기공사	초가이엉잇기 공사(연 2회)	50,000	43,334	6,666	86.7	완료
심곡사 명부전 보수정비	심곡사 종각 기와보수	39,203	39,203	0	100	완료
함벽정 주변정비 및 재난방지시설 구축	노후화장실 리모델링(61.33㎡), 호스릴소화전(2개) 설치	77,062	77,062	0	100	완료
용안향교 대성전 주변정비 및 재난 방지시설 구축	담장(50m) 및 탐방로(100m) 정비, 호스릴소화전(2개소) 설치	54,942	54,941	1	99.9	완료
태봉사 삼존석불 원형복원 고증연구	삼존석불 원형회복 고증연구	75,000	59,580	15,420	79.4	완료
금마도토성 주변정비	금마도토성 수목정비 (문화재구역 34,961.8㎡)	80,939	69,382	11,557	85.7	완료
도지정 목조문화재 재난관리시스템 구축	도지정 목조문화재 (망모당 외 10개소) 재난방지시스템 구축	92,810	78,256	14,554	84.3	완료
문화재안내판 정비	익산 나바위성당 외 7개소 안내판 정비	38,250	28,601	9,649	74.8	완료
향교시설 개선 지원사업	함열향교 화장실 증축 및 리모델링	30,000	28,883	1,117	96.3	완료
익산 근대문화유산 실측조사 및 DB구축	익산 근대문화유산 실측조사 및 DB구축	192,530	192,530	0	100	완료
익산 나바위성당 보수정비	탐방로정비	300,000	295,259	4,741	98.4	완료
익산 나바위성당 미관개선	나바위성당 전선관 및 소방배관 지중화	35,000	33,465	1,535	95.6	완료
익산나바위성당 재난방지시설구축	나바위성당 재난방지시설 (전기ICT) 구축	90,000	78,000	12,000	86.7	완료
익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고 보수정비	사무소와 창고 보수정비	50,000	44,589	5,411	89.2	완료
원불교 익산성지 보수정비	구정원 지붕보수 및 기둥·인방재 보수	70,000	67,121	2,879	95.9	완료
김병순고택 보수정비	종합정비계획 수립 및 행랑채 보수 등	360,000	318,527	41,473	88.5	명시 이월 (~2021.3)
김병순고택 긴급보수공사	방제처리공사	88,585	88,190	395	99.6	완료
김병순고택 재난방지시설구축	김병순고택 재난방지시설 (전기ICT) 구축	70,000	53,156	16,844	75.9	완료
김병순고택 재난방지시설구축	옥외 호스릴 소화전, 자동화재탐지 설비 설치 등	200,000	36,282	163,718	18.1	명시 이월 (~2021.6)
솜리근대역사문화 공간 조성사업	종합정비계획, 근대건축자산 기초조사	800,000	288,000	512,000	36.0	명시 이월 (~2021.6)
이리농악전수교육 육성사업	이리농악의 교육 및 전승활동 지원	42,000	42,000	0	100	완료
이리향제줄풍류 전수교육육성사업	이리향제줄풍류의 교육 및 전승활동 지원	30,000	30,000	0	100	완료
문화재 야행 사업	야간 문화재 활용 프로그램 운영	327,500	305,275	22,225	93.2	완료
문화재 야행 사업 (자체사업)	야간 문화재 활용 프로그램 운영	79,947	79,947	0	100	완료
향교서원 활용사업	향교 문화재 활용 프로그램 운영	120,000	120,000	0	100	완료
생생문화재 사업	문화재활용 프로그램 운영	55,000	55,000	0	100	완료
지역문화유산 교육사업	익산시 초·중학교 대상 지역문화유산 가치이해 교육	46,000	46,000	0	100	완료
세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프	문화재활용 프로그램 운영	50,000	50,000	0	100	완료
백제왕궁 소원등 날리기	문화재활용 프로그램 운영	50,000	50,000	0	100	완료
백제왕궁 토요 야간상설공연	문화재활용 프로그램 운영	50,000	50,000	0	100	완료
박물관을 품은 미륵사지	문화재활용 프로그램 운영	100,000	100,000	0	100	완료
드론을 활용한 역사체험 프로그램	문화재활용 프로그램 운영	50,000	50,000	0	100	완료
국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	문화재활용 프로그램 운영	150,000	150,000	0	100	완료
미륵사지방재IOT 시스템구축	CCTV증설 및 IOT시스템 구축	300,000	256,823	43,177	85.6	명시 이월 (2019.11.~2020.7.)
익산역사문화 고문헌 번역서 발간사업	익산 여산, 함열, 용안읍지 번역	34,000	34,000	0	100	완료
익산소재 박물관 연합도록 발간사업	익산소재 5개 박물관 소장유물 도록발간	50,000	50,000	0	100	완료
백제역사유적지구 융합콘텐츠 교육자료 제작	백제역사유적지구 교육용 콘텐츠 개발	50,000	50,000	0	100	백제세계유산센터 대행사업 (공기관대행)
백제역사유적지구 국내외 팸투어 운영	전문가, 여행사, 여행작가 등 대상 팸투어 운영	42,000	42,000	0	100	백제세계유산센터 대행사업 (공기관대행)
백제역사유적지구 국외 사진전시회 개최	백제역사유적지구의 아름다움을 담은 사진전시회 개최	60,000	60,000	0	100	백제세계유산센터 대행사업 (공기관대행)
미래세대와 함께하는 역사체험 활동	백제역사유적지구 랜선 역사탐방 등	42,000	42,000	0	100	백제세계유산센터 대행사업 (공기관대행)
눈 앞에서 펼쳐지는 백제 세계유산	백제역사유적지구 홍보차량 운영	33,332	33,332	0	100	백제세계유산센터 대행사업 (공기관대행)
문화특화지역 조성사업	시민 문화인력 양성 및 문화생태계 구축	820,000	820,000	0	100	추진중 (~2021.5.)
고도주민협의회 운영지원	고도육성 및 세계유산 보존관리를 위한 주민협의회 지원	37,000	35,518	1,482	96.0	완료
고도마을가꾸기	한지등공예 등을 통한 고도보존에 대한 지역주민 소통과 공감 도모	40,000	34,257	5,743	85.6	완료
익산고도육성 아카데미	고도익산의 역사문화적 가치 이해를 위한 시민 교육프로그램	60,000	60,000	0	100	완료
고도이미지 찾기사업	한옥 및 담장․대문 /가로변외관정비주민지원사업	1,200,000	495,390	704,610	41.3	계속비 이월 (~2021.12.)
고도이미지 찾기사업 (이주단지)	한옥 및 담장․대문주민지원 사업	560,000	540,000	20,000	96.4	집행 잔액
고도지구가로경관 개선사업	가로변보차도정비, 간판정비, 면사무소 이전부지 건축물 철거	646,089	440,465	205,624	68.2	계속비 이월 (~2021.12.)
세계유산 탐방 거점센터 건립	고도통합지원센터, 유적간 연계 환승시설, 기타 편익시설 등	2,000,000	1,513,655	486,345	75.7	명시 이월 (~2021.3.)
고도지구 탑리 마을 주거경관 개선사업	지붕·대문, 담장정비, 소공원 조성 등	1,070,000	1,920	1,068,080	0.2	명시 이월 (~2021.6.)
서동생가터 역사공원조성사업	서동생가터 역사공원조성사업	1,517,894	1,283,842	234,052	84.6	계속비 이월 (~2021.7.)
객사터발굴을 위한 면사무소 이전토지매입	토지매입	1,296,596	1,153,341	143,255	89.0	명시 이월 (~2021.10.)

9. 2020 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

▣ 민원 접수처리 현황

(단위 : 건수)

구분 계	진 정	질 의	요청	탄원	건 의
2		1			1

▣ 민원 접수처리 내역

종류	건 명	민원인	요구내용	처리내용
질의	익산쌍릉 (대왕릉,소왕릉) 관련	청주한씨 종친회 한태락	익산시 사서(쌍릉관련 문헌자료) 기록에 대한 입장, 쌍릉의 피장자, 역사적 고찰에 대한 익산시 견해, 발굴조사기관 지정에 대한 질의 등	익산 쌍릉 문헌기록 및 발굴과정 및 결과 등에 대한 답변 회신
건의	익산시의 역사와 문화에 대한 즉답요청	김명환	역사문화재과 추진사업 공개 및 역사문화 정체성 세우고자함	관세음응험기 해설 자료 및 유적지 발굴 사업예산 자료 제공

10. 기금운용 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영관련

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		미래유산계장		한정희	□

□ 각종 위원회 설치 및 운영현황

(단위 : 천원)

위원회명	설치근거	구성 인원	임기	연임 제한	운영횟수			수당지급현황			비고
					계	대면	서면	예산액	지급액	불용액
국가무형문화재 통합전수교육관 운영위원회	익산국가무형 문화재 통합 전수교육관 설치 및 운영 조례 제6조	8	2	1	0	-	-	-	-	-
익산시 향토유적 심의위원회	익산시 향토유적 보호조례 제3조	11	2	-	1	1	-	-	1,020	-
익산시 고도보존육성 지역 심의위원회	익산시 고도보존 육성 및 주민 지원에 관한 조례 제5조	15	2	-	11	11	-	-	4,780	-

□ 회의록 공개 일자

위원회명	회의구분	회의일자	공개일자	공개방법	미공개사유	비고
익산시 향토유적 심의위원회	대면회의	2020.04.27.	2020.05.01.	시홈페이지
익산시 고도보존육성 지역심의위원회	대면회의	2020.02.27.	2020.03.02.	시 홈페이지
	대면회의	2020.02.27.	2020.03.10.	시 홈페이지
	대면회의	2020.03.27.	2020.03.30.	시 홈페이지
	대면회의	2020.04.08.	2020.04.09.	시 홈페이지
	대면회의	2020.05.13.	2020.05.14.	시 홈페이지
	대면회의	2020.06.24.	2020.06.25.	시 홈페이지
	대면회의	2020.08.27.	2020.09.01.	시 홈페이지
	대면회의	2020.09.23.	2020.09.24.	시 홈페이지
	대면회의	2020.11.03.	2020.11.10.	시 홈페이지
	대면회의	2020.12.22.	2020.12.29.	시 홈페이지
	대면회의	2020.12.22.	2020.12.29.	시 홈페이지

□ 각종 위원회 명단

❍ 국가무형문화재 통합전수교육관 운영위원회

직위	소 속	소속기관 직위	성 명	위촉일	임기	비고
위원장	익산시청	부 시 장	유희숙	당연직
위원	익산시청	경제관광국장	이범용	당연직
〃	익산시의원	시 의 원	강경숙	2019. 02. 28.	2년
〃	이리농악 보존회장	보존회장	김익주	2019. 02. 28.	2년
〃	이리향제줄풍류 보존회장	보존회장	오석신	2019. 02. 28.	2년
〃	전)익산문화원장	전)익산문화원장	김복현	2019. 02. 28.	2년
〃	원광대국악과	교수	우종양	2019. 02. 28.	2년

❍ 익산시 향토유적 심의위원회

직위	소 속	소속기관 직위	성 명	위촉일	임기	비고
위원장	익산시청	부시장	유희숙	당연직
부위원장	원광대학교 고고미술사학과	교수	김정희	2019. 05. 01.	2년
위원	익산시청	경제관광국장	이범용	당연직
〃	원광대학교 고고미술사학과	교수	최완규	2019. 05. 01.	2년
〃	원광대학교 건축학과	교수	홍승재	2019. 05. 01.	2년
〃	전북대학교 건축공학과	교수	남해경	2019. 05. 01.	2년
〃	예원예술대학교 문화재보존예술학과	교수	전경미	2019. 05. 01.	2년
〃	원광대학교 박물관	관장	이다운	2019. 05. 01.	2년
〃	전)익산고등학교	교장	임홍낙	2019. 05. 01.	2년
〃	원광대학교 마한백제문화연구소	책임연구원	문이화	2019. 05. 01.	2년
〃	국립익산박물관	관장	최흥선	2020. 01. 16.	2년

❍ 익산시 고도보존육성지역 심의위원회

직위	소 속	소속기관 직위	성 명	위촉일	임기	비고
위원장	원광대 건축학과	교수	홍승재	2020. 12. 07.	2년
부위원장	군산대 건축학과	교수	송석기	2020. 12. 07.	2년
위 원	익산시의회	의원	한상욱	2020. 12. 07.	2년
〃	익산시의회	의원	소병직	2020. 12. 07.	2년
〃	고도보존 주민협회회	이사장	민두희	2020. 12. 07.	2년
〃	금마면 이장협의회	회장	이시형	2020. 12. 07.	2년
〃	금마면 번영회	회장	김 구	2020. 12. 07.	2년
〃	금마면 주민 자치위원회	위원장	조우형	2020. 12. 07.	2년
〃	원광대 산림조경과	교수	김상욱	2020. 12. 07.	2년
〃	원광대 건축학과	교수	안선호	2020. 12. 07.	2년
〃	마한백제문화연구소	책임연구원	이문형	2020. 12. 07.	2년
〃	마한백제문화연구소	책임연구원	문이화	2020. 12. 07.	2년
〃	호원대 건축학과	교수	김형언	2020. 12. 07.	2년
〃	전주대 건축학과	교수	김준영	2020. 12. 07.	2년
〃	원광대 건축학과	교수	박연정	2020. 12. 07.	2년

□ 법령이나 조례의 근거없이 설치되어 있는 위원회 현황

해   당   없   음

12. 용역사업관련

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	용역업체	용 역 비	계약방법	추진사항
계	33개 사업		2,706,145
학술연구 용역	무형리 고분 시·발굴조사	원광대학교 산학협력단	211,183	수의계약	완료
학술연구 용역	황등제 제방 실체 확인을 위한 시·발굴조사	(재)전북문화재연구원	91,800	수의계약	추진중 (20.5.~21.4.)
설계용역	왕궁리유적 전시관 보수 설계용역	㈜금성건축	678,309	일반경쟁	완료
설계용역	익산 미륵사지 출토부재 실측 및 보존처리계획 수립용역	㈜바른종합건축사사무소	114,900	일반경쟁	완료
설계용역	익산 쌍릉 정비설계 및 종합정비계획 수립	㈜도시건축사사무소	84,401	일반경쟁	완료
학술용역	익산 토성 정비 설계 및 종합정비계획 수립	㈜도시건축사사무소	95,000	일반경쟁	완료
설계용역	2020년 익산 왕궁리유적 정비공사 설계용역	㈜바른종합건축사사무소	78,000	일반경쟁	완료
설계용역	익산 입점리고분 전시관 보수 전시영상 및 소프트웨어 제작용역	㈜서인지엔티	81,992	수의계약	추진중 (20.10.~21.6.)
학술용역	익산 연동리 석조여래좌상 정밀실측 조사용역	㈜아리건축사사무소	69,970	일반경쟁	완료
학술용역	태봉사 삼존석불 원형복원 고증연구용역	(사)전북행정발전연구원	59,580	일반경쟁	완료
설계용역	전통사찰(자명사) 편의시설 건립공사 설계용역	㈜도시건축사사무소	11,415	수의계약	완료 (20.6.~21.2.)
조사용역	익산 황등제 성격과 실체확인 기초학술조사 용역	(재)전북문화재연구원	18,000	수의계약	완료 (19.9.~ 20.1.)
조사용역	익산 함라마을 민속자료 기록화사업	원광대학교 산학협력단	9,000	수의계약	완료
학술연구 용역	익산 근대문화유산 실측조사 및 DB구축	㈜ 바른종합건축사사무소	192,530	일반경쟁	완료
학술연구 용역	익산 구 안대동 성당터 종합정비계획 수립 용역	㈜ 바른종합건축사사무소	18,000	수의계약	완료
계획수립 용역	익산 솜리 근대역사문화공간 종합정비계획	㈜인우 ㈜도시건축사사무소 ㈜볕터건축사사무소	480,000	일반경쟁	추진중 (20.6.~21.6.)
계획수립 용역	김병순고택 종합정비계획	㈜도시건축사사무소	128,000	일반경쟁	완료
설계용역	세계유산 탐방거점센터 건립 종합계획 수립 용역	녹 엔지니어링 건축사사무소	19,671	수의계약	완료
설계용역	고도지구 탑리마을 아름다운 주거 경관개선사업 실시설계 용역	담건축사사무소	66,088	일반경쟁	완료
설계용역	금마 향교 일원 인도(가로변)정비공사 실시설계용역	㈜예한엔지니어링	10,540	수의계약	완료
설계용역	금마고도지구 간판정비사업(3단계) 실시설계용역	수디자인	9,923	수의계약	완료
조사용역	금마면사무소 이전사업 지정폐기물 조사용역	주식회사 하늘석면기술연구원	6,515	수의계약	완료
설계용역	금마면사무소 이전사업 건축물 철거공사 실시설계 용역	㈜예한엔지니어링	1,800	수의계약	완료
용 역	금마향교일원 인도(가로변) 정비공사 건설폐기물 처리용역	(유)진영환경	6,936	수의계약	완료
용 역	금마면사무소 이전사업 건축물 처리공사 폐기물 처리용역 (1차분)	(유)다일환경산업	47,104	일반경쟁	완료
설계용역	금마고도지구 간판정비사업(4단계) 실시설계용역	포스상사	2,620	수의계약	완료
용 역	금마면사무소 이전사업 건축물 철거공사 소각페기물처리용역(1차분)	대한청정	18,057	수의계약	완료
학술연구 용역	익산 서동생가터(역사문화공원)조성부지 문화재 표본조사 (1차)용역	전북문화재연구원	7,450	수의계약	완료
용 역	금마면사무소이전사업 지정폐기물 철거 중 비산정도측정용역	주식회사 하늘석면기술연구원	2,910	수의계약	용역중지중 (2020.11.2.~)
용 역	금마면사무소 이전사업 지정폐기물 운반 및 처리용역	(유)금솔	11,880	수의계약	용역중지중 (2020.9.24.~)
감리용역	금마면사무소 이전사업 지정폐기물 철거 감리용역	건축법인 녹엔지니어링 건축사사무소	3,110	수의계약	용역중지중 (2020.11.12.~)
계획수립 용역	서동생가터 역사공원구역결정 및 공원조성계획 전략환경영향평가용역	주식회사 건일	51,730	일반경쟁	용역중지중 (2020.3.~)
설계용역	익산고등학교담장정비 공사 실시설계 용역	담건축사사무소	17,731	수의계약	완료

13. 인 ․ 허가 민원처리 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□

❍ 2020년 인･허가 민원처리 현황

민 원 명	처리건수	비 고
고도보존육성 지구에서의 행위허가	45	건물 신축 및 시설물 설치 등

❍ 불허, 취하 민원현황 및 내용과 사유

해   당   없   음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

(단위 : 천원)

일자	사 업 명	계약액	변경액	증감	계약자	공사기간	변경사유 등
계	39개 사업	6,508,343	7,861,583	1,353,240
2020. 01.20.	익산 제석사지 정비공사 폐기물 처리용역	40,938	44,682	3,744	㈜일진 도시환경	2019.11.19.~2020.2.2.	현장조사 결과 지하 폐기물물량 반영
2020. 01.30.	미륵사지 광장 정비 전기공사	45,935	60,989	15,054	㈜하이테크	2019.6.17. ~2020.6.16.	노후 가로등 교체 반영
2020. 03.06.	김병순 고택 방제처리공사	77,158	88,190	11,032	주식회사 거림문화재	2019.12.2. ~2020.3.12.	공사구간증가
2020. 04.08.	왕궁리유적 야간 경관조명등 설치 전기공사	66,315	105,719	39,404	(유)화신전력	2019.11.27.~2020.6.2.	현장조사 결과 안전을 위해 가로등 등 물량증가
2020. 04.14.	익산 연동리 석조여래좌상 불단정비 공사	58,525	64,210	5,685	㈜진수 종합건설	2020.2.11. ~2020.4.16.	전문가 현지자문 내용반영 물량변경 (강화유리 두께 변경)
2020. 04.17.	익산 제석사지 정비공사	315,610	361,842	46,232	(유)남전 종합건설	2019.11.15.~2020.5.12.	현장조사 결과 보강조치 물량 반영 (잔디식재 및 안내판 설치)
2020. 04.22.	익산 왕궁리유적 북측관리소 조성공사	184,311	219,147	34,836	㈜동강 종합건설	2020.3.12. ~2020.5.11.	발굴 및 현장조사 결과 사업구간 조정사항 반영 (북측관리소 배수처리 위한 집수정 규격 변경)
2020. 04.29.	여산 숲정이 순교성지 주변 정비 설계용역	31,100	39,667	8,567	㈜바른종합건축사사무소	2020.2.10. ~2020.3.20.	추가 예산확보 관련 과업 물량증가
2020. 05.01.	익산 왕궁리유적 북측관리소 조성 전기공사	29,791	34,526	4,735	㈜이공이엔지	2020.3.12. ~2020.5.11.	현장조사 결과 조도확보 위한 가로등 물량증가
2020. 05.15.	2019년 익산 미륵사지 정비공사	740,400	996,571	256,171	(유)금경종합건설	2019.9.26. ~2020.9.19.	기술지도 결과 물량 증가 및 변동사항 반영 (서원회랑지 배수 처리 및 석재 가공 수량 변경)
2020. 05.18.	미륵사지 야간 경관조명등 설치 전기공사	61,164	100,572	39,408	전북전기공사	2019.11.26. ~2020.5.28.	현장점검 결과 투광등, 가로등 등 물량변동사항 반영
2020. 05.22.	미륵사지 방재IOT시스템 구축	53,351	53,427	76	주식회사 영산시스템	2019.11.14.~2020.7.3	소요자재 증가
2020. 06.03.	금마고도지구(금마시장일원)간판정비사업	19,264	19,673	409	익산종합기획	2020.4.7. ~2020.6.5.	간 판 물 량 증 가 (3개소)
2020. 06.05.	금마 고도지구(금마4길 일원)간판정비사업	64,428	71,757	7,329	모든종합기획	2020.4.16. ~2020.6.14.	간 판 물 량 증 가 (3개소)
2020. 06.17.	금마고도지구(동고도리일원)간판정비사업	76,004	81,493	5,489	라이프디자인	2020.4.22. ~2020.6.20.	간 판 물 량 증 가 (2개소)
2020. 06.19.	금마 향교일원 인도(가로변) 정비공사	47,658	51,390	3,732	(주)성민건설	2020.4.20. ~2020.7.1.	콘트리트 및 아스콘 물량증가
2020. 06.30.	여산향교 대성전 주변정비 및 재난방지시설 구축 (전기)	3,637	2,618	△1,019	현성이엔씨	2020.6.2. ~2020.7.1.	현장조사 결과 문화재경관 및 미관을 위해 변동사항 반영
2020. 07.03.	익산 백제왕궁 ICT역사관 조성 설계용역	600,000	678,309	78,309	㈜금성종합 건축사사무소	2019.6.11. ~2020.3.31.	문화재위원회 심의 결과 반영 과업내용 증가 (증축역사관 규모 조정, 기존 역사관 외부 리모델링 금번 공사에 포함)
2020 07.07.	무형리 고분 발굴조사	179,183	211,183	32,000	원광대학교 산학협력단	2020.3.30. ~2020.7.10.	학술자문회의 및 현장조사 결과 반영 (선형유구 추가 발굴조사, 원형 보존 위한 복토 및 잔디식재)
2020. 07.07.	나바위성당 전선 및 배관 지중화 건축공사	10,809	11,344	535	주식회사 진수종합건설	2020.4.27. ~2020.7.8.	현장조사결과 변동사항반영
2020. 07.17.	익산 숭림사 보광전 주변 정비공사	62,331	70,477	8,146	주식회사 다온	2020.6.8. ~2020.7.20.	소유자 요청 및 현장조사 내용반영 물량증가
2020. 08.06.	익산 쌍릉 정비공사	260,714	298,185	37,471	㈜한종합건설	2019.11.25. ~2020.8.31.	기술지도 및 전문가자문 결과 공사내용 반영 (폐쇄석 강화처리, 목함(금송) 제작 1식)
2020. 09.01.	2019년 익산 왕궁리유적 정비공사	979,579	1,349,079	369,500	(유)금경종합건설, ㈜호연종합건설	2019.12.17. ~2020.11.7.	현장조사 결과 공사물량 증가 반영 (발굴지 배수로 정비 및 미정비 구간 및 훼손 구간 구절초 식재)
2020. 09.08.	함벽정 주변정비 및 재난방지시설 구축 소방공사	21,627	18,837	△2,790	㈜동보이엔지	2020.7.7. ~2020.9.15.	현장조사 결과 배관 재료 변경 및 우천으로 인한 기한연장
2020. 09.10.	함벽정 주변정비 및 재난방지시설 구축 건축공사	32,183	41,361	9,178	㈜상락문화재	2020.7.7. ~2020.9.15.	현장조사 결과 노후 천장재, 큐비클 교체 물량 반영 및 우천으로 인한 기한연장
2020. 10.12.	익산 왕궁리유적 방범시설 구축공사	35,193	45,885	10,692	㈜거북이 정보통신	2020.8.24. ~2020.10.14.	현장조사 결과 단절된 통신선로 복구 물량 반영
2020. 10.20.	원불교 익산성지 보수정비	43,822	59,119	15,297	유한회사 서림문화재	2020.6.24. ~2020.10.29.	기술자문내용반영 (기둥동바리, 하방 교체 물량 증가)
2020. 10.26.	익산 나바위성당 탐방로 정비	164,755	263,303	98,548	주식회사 상락문화재수리	2020.7.10. ~2020.11.21.	기술자문내용반영 공사물량증가 (우수관로 설치 등)
2020. 11.06.	금마면사무소이전사업 지정폐기물 철거공사	39,604	46,186	6,582	청미래환경 주식회사	2020.4.10. ~2020.11.17.	석 면 물 량 증 가
2020. 11.06.	금마면사무소 이전사업 건축물 철거공사	28,645	59,404	30,759	일진도시개발	2020.5.20. ~2020.11.15.	비계설치물량 증가 (당초 0㎡→변경 1,384㎡)
2020. 11.25.	2019년 익산 왕궁리유적 정비공사	1,349,079	1,331,008	△18,071	(유)금경종합건설, ㈜호연종합건설	2019.12.17. ~2020.11.7.	현장조사 결과 공사물량 증감 등 변동사항 반영 (구절초 및 잔디 식재 수량 감소)
2020. 11.27.	김병순고택 보수정비 공사	111,965	176,965	65,000	주식회사조양	2020.8.14. ~2020.12.4.	기술자문내용반영 (행랑채 회첨골 추가 해체,담장보수)
2020. 11.30.	세계유산 녹지 생육환경 개선사업	17,805	19,350	1,545	(유)여원조경 개발	2020.11.17. ~2020.12.6.	소나무 해충 잠복소 추가설치
2020. 12.02.	여산 숲정이 순교성지 주변정비 전기공사	44,064	54,862	10,798	(유)화신전력	2020.8.31. ~2021.4.9.	현장조사 결과 안전을 위해 가로등 물량 증가
2020. 12.04.	익산 입점리고분 전시관 보수 공사(전기)	10,197	14,522	4,325	㈜두연데크	2020.9.21. ~2020.12.19.	현장조사 결과 2층 노후 조명 교체
2020. 12.07.	익산 입점리고분 전시관 보수 공사(건축)	195,225	207,449	12,224	(유)예원종합건설	2020.9.21. ~2020.12.19.	현장조사 결과 공사물량 변경 (부출입구 지붕 경사 방수 물량 증가)
2020. 12.07.	익산 입점리고분 전시관 보수 공사(통신)	29,967	30,949	982	거창 엔지니어링	2020.9.14. ~2020.12.12.	현장조사 결과 현장상황 및 프로그램 사양 변경
2020. 12.10.	익산 미륵사지 탐방로 정비공사	352,907	442,243	89,336	㈜예원종합 건설	2020.6.19. ~2020.12.15.	현장조사 결과 물량증가 (미륵산성 등 탐방로 맨홀 수량변경 및 측구 수로관 추가 설치 등)
2020. 12.11.	금마도토성 주변정비 임목폐기물 처리용역	23,100	35,090	11,990	㈜칠보환경 개발	2020.4.23. ~2020.12.28.	추가 수목정비 관련 폐기물 물량 증가

15. 건설공사 집행현황(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사업비	집행액	집행잔액	비고
계	34개 사업	30,735,713	22,126,752	8,608,961	이월액은 잔액에 포함
2018년 왕궁리유적 정비	발굴조사, 발굴지 정비, 탐방로 정비	3,514,300	3,514,076	224	완료
2019년 왕궁리유적 정비	발굴조사, 발굴지 정비, 경관조명 설치	3,071,428	2,507,438	563,990	계속비 이월
왕궁리유적 북측관리센터 조성	북측관리센터 (주차장, 화장실) 조성	700,000	549,006	150,994	계속비 이월
왕궁리유적 전시관 보수	백제왕궁 ICT역사관 조성	5,366,667	1,876,004	3,490,663	계속비 이월 (~2021.12.)
2018년 미륵사지 정비	복원고증연구, 배수로 및 기단부 정비공사, 탐방로 및 화장실 보수	3,180,000	3,180,000	0	완료
2019년 미륵사지 정비	복원고증연구, 건물지 기단부 정비, 광장 전면부 정비, 경관조명설치	4,371,429	3,745,641	625,788	계속비 이월
2020년 미륵사지 정비공사	건물지 기단부 정비	1,000,000	354,539	645,461	계속비 이월 (~2021.9.)
미륵사지 탐방로 정비 공사	미륵사지 탐방로 정비	450,000	450,000	0	완료
미륵사지 가마터 보호각 개보수	조선시대 가마터 보호각 개보수	900,000	499,451	400,549	계속비 이월 (~2021.2.)
	북승방지 정비	454,050	427,316	26,734	완료
제석사지 정비
	발굴지(대왕릉) 유적 정비, 종합 정비계획 수립 (문화재구역 55,534㎡)	297,209	277,775	19,434	완료
2019년 익산 쌍릉 정비
	토성 성벽 내부 추가 발굴지 정비, 종합 정비계획 수립(문화재구역 62,412㎡)	600,000	585,817	14,183	완료
2019년 익산 토성 정비
	보광전 전면계단 및 기단(70m), 앞마당 정비(400㎡)	80,000	76,866	3,134	완료
익산 숭림사 보광전 주변정비
	입점리 고분 전시관 지붕 및 내부 마감재 보수(연면적 1,224㎡)	600,000	294,068	305,932	명시이월 (~2021.6.)
익산 입점리 고분 전시관 보수
	성토부지 정비 및 조경식재 (2차 / 6,959㎡)	476,000	199,125	276,875	명시이월 (~2021.2.)
여산 숲정이 순교 성지 주변정비
	초가이엉잇기 공사(연 2회)	50,000	43,334	6,666	완료
이병기선생생가 초가이엉잇기공사
	심곡사 종각 기와보수	39,203	39,203	0	완료
심곡사 명부전 보수정비
	노후화장실 리모델링(61.33㎡), 호스릴소화전(2개) 설치	77,062	77,062	0	완료
함벽정 주변정비 및 재난방지시설 구축
용안향교 대성전 주변정비 및 재난 방지시설 구축	담장(50m) 및 탐방로(100m) 정비, 호스릴소화전(2개소) 설치	54,942	54,941	1	완료
금마도토성 주변정비	금마도토성 수목정비 (문화재구역 34,961.8㎡)	80,939	69,382	11,557	완료
도지정 목조문화재 재난관리시스템 구축	도지정 목조문화재 (망모당 외 10개소) 재난방지시스템 구축	92,810	78,256	14,554	완료
익산 나바위성당 보수정비	탐방로정비	300,000	295,259	4,741	완료
익산 나바위성당 미관개선	나바위성당 전선관 및 소방배관 지중화	35,000	33,465	1,535	완료
익산 나바위성당 재난방지시설 구축	나바위성당 재난방지시설 (전기ICT) 구축	90,000	78,000	12,000	완료
익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고 보수정비	사무소와 창고보수정비	50,000	44,589	5,411	완료
원불교익산성지 보수정비	구정원 지붕보수 및 기둥·인방재 보수	70,000	67,121	2,879	완료
김병순고택 보수정비	종합정비계획 수립 및 행랑채 보수 등	360,000	318,527	41,473	명시이월 (2020.3. ~ 2021.3.)
김병순고택 긴급보수공사	방제처리공사	88,585	88,190	395	완료
김병순고택 재난방지시설구축	김병순고택 재난방지시설 (전기ICT) 구축	70,000	53,156	16,844	완료
김병순고택 재난방지시설구축	옥외 호스릴 소화전, 자동화재탐지 설비 설치 등	200,000	36,282	163,718	명시이월 (2020.12. ~ 2021.6.)
미륵사지 방재IOT 시스템구축	CCTV증설 및 IOT시스템 구축	300,000	256,823	43,177	완 료 (2019.11. ~ 2020.7.)
고도지구가로경관 개선사업	금마면사무소 이전부지 건축물 철거 및 간판정비사업	646,089	440,465	205,624	완 료 (계속비이월) (~2021.12.)
고도지구 탑리마을 주거경관개선사업	지붕·대문, 담장정비, 소공원 조성 등	1,070,000	1,920	1,068,080	완료 (명시이월) (~2021.6.)
세계유산 탐방거점센터 건립	고도통합지원센터, 유적간 연계 환승시설, 기타 편익시설 등	2,000,000	1,513,655	486,345	완료 (명시이월) (~2021.3.)

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

(단위 : 천원)

보조단체	보조사업명	예산액	집행액	잔액	비고
계	39개 사업	6,710,608	5,850,555	860,053	이월액은 잔액에 포함
대한불교 조계종 관음사	익산 관음사 목조보살 입상 보호각 건립	1,500,000	1,500,000	0	행정절차이행 (인허가 접수 2021.3.)
대한불교 조계종 심곡사	심곡사 수장고 건립	1,200,000	1,161,095	38,905	명시이월 (2020.11.~2021.7.)
충간공 보물 제651호 박물관	육각정 보수	150,000	143,164	6,836	완료
(재)전북향교재단 함열향교	함열향교 시설개선 지원사업	30,000	28,883	1,117	완료
대한불교 조계종 자명사	전통사찰 편의시설 (화장실) 건립	88,585	0	88,585	명시이월 (2021.3.~2021.7.)
이리농악 보존회	전수교육 육성사업	42,000	42,000	0	완료
	대한민국 농악축제	14,000	14,000	0	완료
	전수교육관 활성화사업	18,750	18,750	0	완료
이리향제 줄풍류 보존회	전수교육관 운영	7,453	7,453	0	완료
	전수교육 육성사업	30,000	30,000	0	완료
	전수교육관 활성화사업	27,500	27,500	0	완료
	전수교육관 운영	12,660	12,660	0	완료
	전수교육 육성사업	8,000	8,000	0	완료
익산성당포구 농악보존회
	도지정 무형문화재 공개행사비	3,400	3,400	0	완료
	무형문화재 전수시설 개선사업	12,000	12,000	0	완료 (명시이월) (2020.1.~2020.3.)
	전수교육 육성사업	12,000	12,000	0	완료
익산목발 노래보존회
	도지정 무형문화재 공개행사비	3,400	3,400	0	완료
	전수교육 육성사업	12,000	12,000	0	완료
익산기세배 보존회
	도지정 무형문화재 공개행사비	3,400	3,400	0	완료
	무형문화재 전수시설 개선사업	11,460	11,460	0	완료
원광대학교 산학협력단 (마한백제문화연구소)	역사고도 익산의 정체성 확립 학술회의	25,000	25,000	0	완료
익산문화관광재단	문화특화지역 조성사업	820,000	820,000	0	추진중 (~2021.5.)
(사)교육문화중심 아이행복	향교·서원 문화재 활용사업	120,000	120,000	0	완료
마수리늘배움협회	생생문화재 사업	55,000	55,000	0	완료
(재)전북문화재연구원	지역문화유산 교육사업	46,000	46,000	0	완료
길청소년 활동연구소	세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프	50,000	50,000	0	완료
	백제왕궁 소원등날리기	50,000	50,000	0	완료
익산민예총	백제왕궁 토요 야간상설공연	50,000	50,000	0	완료
룩스필하모닉 오케스트라	박물관을 품은 미륵사지	100,000	100,000	0	완료
원광대학교 산학협력단	드론을 활용한 역사체험 프로그램	50,000	50,000	0	완료
창의융합교육연구회	국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	150,000	150,000	0	완료
원광대학교 산학협력단 (대안문화연구소)	문학인과 함께하는 백제역사문화탐방	27,000	27,000	0	완료
원광대학교 산학협력단 (한문번역연구소)	익산역사문화 고문헌 번역사업	34,000	34,000	0	완료
원광대학교 (원광대박물관)	익산소재 박물관 연합도록 발간사업 고문헌 번역사업	50,000	50,000	0	완료
익산고도육성 세계유산 보전관리 주민협의회	익산고도육성 세계유산보전관리 주민협의회운영지원	37,000	37,000	0	완료
	고도마을가꾸기	40,000	40,000	0	완료
전북문화재연구원	고도육성아카데미	60,000	60,000	0	완료
박주연 외 13명	고도 이미지 찾기 사업(보조)	1,200,000	495,390	704,610	계속비이월 (~2021.12.)
김병호 외 7명	고도 이미지 찾기 사업(자체)	560,000	540,000	20,000	완료

17. 국 ․ 도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				잔액	비고
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
37개 사업	44,744,865	26,458,821	8,801,822	9,484,222	34,615,851	22,682,617	5,724,291	6,208,943	10,129,014	이월액은 잔액에 포 함
2018년 왕궁리유적 정비	3,514,300	2,460,010	527,145	527,145	3,514,076	2,459,853	527,111	527,112	224	완료
2019년 왕궁리유적 정비	3,071,428	2,150,000	460,714	460,714	2,507,438	1,755,206	376,116	376,116	563,990	계속비이월 (~2021.12.)
왕궁리 유적 전시관 보수	700,000	210,000	245,000	245,000	680,298	204,089	238,105	238,104	19,702	계속비이월 (~2021.12.)
2020년 왕궁리유적 정비	142,857	100,000	21,428	21,429	87,340	61,138	13,101	13,101	55,517	계속비이월 (~2021.12.)
왕궁리유적 북측관리센터 조성	700,000	490,000	105,000	105,000	549,006	384,304	82,351	82,351	150,994	계속비이월 (~2021.12.)
왕궁리유적 전시관 보수	5,366,667	1,610,000	1,878,334	1,878,333	1,876,004	1,297,801	289,102	289,101	3,490,663	계속비이월 (~2021.12.)
2018년 미륵사지 정비	3,180,000	2,226,000	477,000	477,000	3,180,000	2,226,000	477,000	477,000	0	완료
2019년 미륵사지 정비	4,371,429	3,060,000	655,714	655,715	3,745,641	2,621,949	561,846	561,846	625,788	계속비이월 (~2021.12.)
2020년 미륵사지 정비공사	1,000,000	700,000	150,000	150,000	354,539	248,177	53,181	53,181	645,461	계속비이월 (~2021.9.)
미륵사지 탐방로 정비 공사	450,000	315,000	67,500	67,500	450,000	315,000	67,500	67,500	0	완료
미륵사지 가마터 보호각 개보수	900,000	630,000	135,000	135,000	499,451	349,616	74,918	74,917	400,549	계속비이월 (~2021.12.)
2020년 미륵사지 토지매입	1,500,000	1,050,000	225,000	225,000	1,393,636	975,545	209,045	209,046	106,364	계속비이월 (~2021.3.)
미륵사지 복원 고증연구	1,300,000	910,000	195,000	195,000	1,300,000	910,000	195,000	195,000	0	완료
제석사지 정비	454,050	317,835	68,108	68,107	427,316	299,121	64,098	64,097	26,734	완료
2019년 익산 쌍릉 정비	297,209	208,046	44,581	44,582	277,775	194,443	41,666	41,666	19,434	완료
익산 쌍릉 정비	4,200,000	2,940,000	630,000	630,000	4,071,130	2,849,790	610,670	610,670	128,870	명시이월 (~2021.4.)
익산 관음사 목조보살 입상 보호각 건립	1,500,000	1,050,000	225,000	225,000	1,500,000	1,050,000	225,000	225,000	0	추진중 (~2021.12.)
익산 심곡사 수장고 건립	1,200,000	840,000	180,000	180,000	1,161,095	812,767	174,164	174,164	38,905	명시이월 (~2021.7.)
충간공 보물 제651호 박물관 육각정 보수	150,000	45,000	52,500	52,500	143,164	42,949	50,107	50,108	6,836	완료
2019년 익산 토성 정비	600,000	420,000	90,000	90,000	585,817	410,072	87,872	87,873	14,183	완료
익산 입점리 고분 전시관 보수	600,000	180,000	210,000	210,000	294,068	88,220	102,924	102,924	305,932	명시이월 (~2021.6.)
여산 숲정이 순교 성지 주변정비	476,000	0	238,000	238,000	199,125	0	99,562	99,563	276,875	명시이월 (~2021.2.)
익산 나바위성당 보수정비	300,000	210,000	45,000	45,000	295,259	206,000	44,629	44,630	4,741	완료
김병순고택 보수정비	360,000	252,000	54,000	54,000	318,527	222,969	47,779	47,779	41,473	완료 (명시이월)
김병순고택 재난방지시설구축	200,000	140,000	18,000	42,000	36,282	25,398	3,265	7,619	163,718	명시이월 (~2021.6.)
솜리근대역사문화 공간 조성사업	800,000	400,000	200,000	200,000	288,000	144,000	72,000	72,000	512,000	명시이월 (~2021.6.)
미륵사지 방재IOT 시스템 구축	300,000	210,000	27,000	63,000	256,823	179,776	23,114	53,933	43,177	완료 (‘19명시이월)
세계유산 홍보 지원사업 (백제역사유적지구)	477,336	238,668	71,600	167,068	477,336	238,668	71,600	167,068	0	완료
문화특화지역 조성사업	820,000	0	476,000	344,000	820,000	0	476,000	344,000	0	추진중 (~2021.5.)
문화재 야행사업	327,500	131,000	58,950	137,550	305,275	122,110	54,949	128,216	22,225	완료
향교·서원 문화재 활용사업	120,000	48,000	21,600	50,400	120,000	48,000	21,600	50,400	0	완료
세계유산 활용 프로그램 사업 (백제역사유적지구)	300,000	150,000	45,000	105,000	300,000	150,000	45,000	105,000	0	완료
국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	150,000	75,000	22,500	52,500	150,000	75,000	22,500	52,500	0	완료
고도이미지찾기 사업(한옥및담장, 가로변외관지원)	1,200,000	840,000	108,000	252,000	495,390	346,773	44,585	104,032	704,610	계속비 이월 (~ 2021.12.)
고도지구가로 경관 개선사업	646,089	452,262	58,148	135,679	440,465	308,325	39,642	92,498	205,624	계속비 이월 (~2021.12.)
세계유산 탐방 거점센터 건립	2,000,000	1,400,000	180,000	420,000	1,513,655	1,059,558	136,229	317,868	486,345	명시이월 (~2021.3.)
고도지구 탑리마을 주거경관 개선사업	1,070,000	0	535,000	535,000	1,920	0	960	960	1,068,080	명시이월 (~2021.6.)

18. 2020년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

□ 명시 및 사고이월 내역 : 15건(명시 13, 사고 2)

□ 명시이월 내역 : 13건

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	비 고
계 (13개 사업)	1,970,869	1,872,824	98,045
마한 실체 규명을 위한 시·발굴조사	212,000	211,183	817	완료
익산 쌍릉 정비	297,209	277,775	19,434	완료
익산 토성 정비	600,000	585,817	14,183	완료
연안이씨 종중문적 보존 처리 및 보관함 제작	98,519	83,742	14,777	완료
함열향교 시설개선 지원사업	30,000	28,883	1,117	완료
익산 나바위성당 노출전선관 및 소방배관 지중화	35,000	33,465	1,535	완료
국가지정 및 등록문화재 보수정비 시설부대비	148	148	0	완료
익산 김병순고택 흰개미 방충사업	88,585	88,190	395	완료
무형문화재 전수시설 개선사업 (익산기세배)	12,000	12,000	0	완료
미륵사지 방재 IOT시스템 구축	300,000	256,823	43,177	완료
익산 황등제 성격과 실체확인 기초학술조사용역	18,000	18,000	0	완료
미륵사지 야외 음수대 설치	15,000	12,390	2,610	완료
면사무소 이전사업 토지매입	264,408	264,408	0	완료

□ 사고이월 내역 : 2건

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	비 고
계 (2개 사업)	752,530	732,530	20,000
익산 근대문화유산 실측조사 및DB구축	192,530	192,530	0	완료
고도지구 주거환경 및 가로경관 개선지원(자체)	560,000	540,000	20,000	완료

19. 2021 명시이월내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

□ 명시이월내역

(단위 : 천원)

사 업 명	명 시 이월액	명시이월 사유	비 고
계 (16개 사업)	3,429,303
황등제 제방 실체 확인을 위한 시·발굴조사	66,700	용역 준공시기(2021. 4월) 미도래	용역중 (20.2.~21.4.)
익산 쌍릉 정비	122,220	토지매입 지속 추진	토지매입비 지급 (2021.4.)
익산 입점리고분 전시관 보수	304,842	전시공사 준공시기(2021. 6월) 미도래	전시공사중 (20.10.~21.6.)
익산 심곡사 칠층석탑 출토 금동불감 및 금동아미타여래 칠존좌상 수장고 건립	38,905	준공시기(2021. 7월) 미도래	공사중 (20.11.~21.7.)
여산숲정이순교 성지 주변정비	276,875	주변정비사업 준공시기(2021. 4월) 미도래	완료
전통사찰(자명사) 편의시설 지원사업	11,415	설계용역 준공시기(2021. 2월) 미도래	완료
전통사찰(자명사) 편의시설 지원사업	88,585	설계용역 준공시기(2021. 2월) 미도래	공사중 (21.3.~21.7.)
구 안대동 성당터 종합정비계획	20,000	준공시기(2021. 2월)미도래	완료
나바위성당 주변정비 및 착지처조성설계용역	16,200	준공시기(2021. 1월)미도래	완료
김병순고택보수정비 (김병순고택종합정비계획)	105,472	준공시기(2021. 3월)미도래	완료
솜리근대역사문화공간 종합정비계획	512,000	준공시기(2021. 6월)미도래	추진중 (20.6~21.6)
김병순고택 재난방지시설 구축	163,718	동절기부실공사 방지 및 소유자 부재로 인한 공사추진 불가 준공시기(2021. 6월) 미도래	추진중 (20.12~21.6)
시설부대비 (익산 쌍릉 정비 외 3건)	6,650	국가지정 및 등록문화재 보수정비사업 추진에 따른 자문수당 및 부대경비	추진중 (20.6~21.6)
세계유산 탐방거점센터 건립	486,345	수용재결로 인한 토지매입 추진, 건축설계공모 및 행정절차 이행	추진중 (20.6.~22.12.)
고도지구 탑리마을 주거경관개선사업	1,068,074	주민의견 수렴 및 수요조사 추진 및 실시설계 용역 진행	추진중 (2021.6.)
면사무소 이전사업 토지매입	141,302	주민 이주 후 건물철거 및 이주비 집행	추진중 (2021.10.)

20. 예산 이용, 전용 및 예비비 집행 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

21. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업비	공사기간		연장사유
		당초	변경
계 (6개 사업)	726,381
무형리 고분 발굴조사	211,183	2020.3.30. ~2020.7.22.	2020.3.30. ~2020.9.10.	학술자문회의 및 현장 조사 결과 반영으로 인한 용역기한(21일) 연장
함벽정 주변정비 및 재난방지시설 구축 건축 및 소방공사	60,198	2020.7.7. ~2020.8.23.	2020.7.7. ~2020.9.15.	현장조사 결과 반영 및 우천으로 인한 공사 기한(20일) 연장
익산 나바위성당 보수정비	300,000	2020.7.10. ~2020.10.29.	2020.7.10. ~2020.11.21.	기술자문결과 공사물량 증가 등 변동사항 반영 및 추가 공정에 따른 소요 공사기간(20일) 연장
익산 나바위성당 미관개선	35,000	2020.4.27. ~2020.6.2.	2020.4.27. ~2020.7.8.	현장조사결과 기존 목부재의 노후로 인해 부식된 멍에 및 장선 등 교체 검토를 위해 공사기간(30일) 연장
익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고 보수정비	50,000	2020.5.22. ~2020.7.31.	2020.5.22. ~2020.8.17.	장기우천으로 인하여 외부도장 공사가 지연되어 공사기간(13일) 연장
원불교 익산성지 보수정비	70,000	2020.6.24. ~2020.9.2.	2020.6.24. ~2020.10.29.	기술자문 결과 추가 공사분과 우천으로 인한 공정 지연사항에 대해 공사기간(44일) 연장

22. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

23. 국 ․ 도비 반납 현황 및 사유(2020년 반납건)

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 2020년 국·도비 반납 현황 및 사유

(단위 : 천원)

사업명	예산액	집행액	반납액	반납사유	비고
계 (21개 사업)	19,646,907	18,876,991	673,497
2017년 문화재 보수정비사업	2,000,000	1,990,148	14,278	집행잔액 및 이자 (국비 4,926 / 도비 2,463 / 이자 6,889)	국비 도비
2018년 문화재 보수정비사업	1,617,000	1,294,795	275,136	집행잔액 및 이자 (국비 215,133 / 도비 53,536 / 이자 6,467)	국비 도비
2019년 문화재 보수정비사업	708,857	650,595	49,848	집행잔액 및 이자 (국비 39,388 / 도비 9,437 / 이자 1,023)	국비 도비
2019년 문화재 안내판 정비사업	32,900	27,372	5,528	집행잔액 및 이자 (국비 3,339 / 도 2,127 / 이자 62)	국비 도비
문화재 긴급 보수사업	70,000	57,589	12,527	집행잔액(12,411) 및 이자(116)	국비
2019년 문화재 재난 안전관리사업	511,000	414,719	90,972	집행잔액 및 이자 (국 79,467 / 도 10,614 / 이자891)	국비 도비
2017~2019년 백제역사유적지구 보존관리 사업	7,952,857	7,847,934	89,186	집행잔액 (국 73,447 / 도 15,739)	국비 도비
2018년 도지정문화재 보수정비사업	231,000	212,041	9,480	집행잔액	도비
2019년 도지정문화재 보수정비사업	835,000	829,373	2,814	집행잔액	도비
2019년목조문화재 U-안전 관리시스템	4,293	3,939	354	집행잔액	도비
2019년 향교서원 시설 개보수(함열향교)	300,000	288,883	336	집행잔액	도비
2019년도 이리농악 전승학교 지원	12,000	11,400	240	집행잔액	도비
2017년 세계유산 활용 및 홍보사업 (백제역사유적지구)	61,800	58,494	3,588	집행잔액(3,306) 및 이자(282)	도비
2018년 세계유산 활용 및 홍보사업 (백제역사유적지구)	70,200	65,605	5,032	집행잔액(4,595) 및 이자(437)	도비
2019년 세계유산 활용 및 홍보사업 (백제역사유적지구)	430,000	410,784	13,793	집행잔액 및 이자 (국비 9,610 / 도비 2,882 / 이자 1,301)	국비 도비
2019년 문화재야행 사업	160,000	159,999	11	집행잔액(10) 및 이자(1)	국비
2019년 향교·서원 문화재 활용사업	30,000	30,000	119	이자	국비
2019년 생생문화재 사업	120,000	120,000	64	이자	국비
2019년도 고도주민 활동지원사업	100,000	97,495	1,387	집행잔액(1,253) 및 이자(134)	국비
2017년 고도 이미지찾기 사업	3,685,714	3,591,540	96,047	집행잔액 및 이자 (국비 65,922 / 도비 8,476 / 이자 21,649)	국비 도비
2018년 고도 이미지찾기 사업	714,286	714,286	2,757	이자	국비 도비

□ 2021년 국·도비 반납 예정 현황 및 사유

(단위 : 천원)

사업명	예산액	집행액	반납액	반납사유	비고
계 (15개 사업)	2,140,274	2,046,380	96,753
문화재 안전경비원 배치 및 활용	84,690	84,324	237	집행잔액	국비 도비
미륵사지 방재IOT 시스템구축	300,000	256,823	34,110	집행잔액	국비 도비
전통사찰 방재 시스템 유지관리	25,598	24,318	959	집행잔액	국비 도비
문화재 안내판 정비	38,250	28,601	8,048	집행잔액	국비 도비
무형문화재 전수활동비	106,500	104,000	1,000	집행잔액	도비
이리농악 전승학교 지원	12,000	5,050	2,780	집행잔액	도비
전수교육관 문화 예술교육사 배치사업	20,000	12,273	4,481	집행잔액	국비 도비
세계유산 보존관리 사업 (백제역사유적지구)	200,000	199,980	16	집행잔액	국비 도비
문화재 야행 사업	327,500	305,275	12,890	집행잔액	국비 도비
도지정 무형문화재 공개행사비 (익산목발의노래)	3,400	3,400	6	정산잔액	도비
생생문화재 사업	55,000	55,000	86	정산잔액	국비 도비
세계유산 활용 프로그램 사업	300,000	300,000	8,784	정산잔액	국비 도비
국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	150,000	150,000	2,878	정산잔액	국비 도비
세계유산 홍보 지원사업	477,336	477,336	14,735	정산잔액	국비 도비
고도마을가꾸기	40,000	40,000	5,743	정산잔액	국비 도비

24. 2020 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

25. 2020 계획사업중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	구분	미집행사유	비고
고도 익산, 서안 교류를 위한 국제학술대회	50,000	시비 50,000	코로나19 확산이 장기화됨에 따른 대규모 국제행사 취소

26. 2020 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

27. 2020 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

28. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

29. 소송 사건 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□

사 건 명	사 건 개 요	원 고	피 고	접수일	추진사항 (판․종결일)
	계 (4건)
전주2020 구합1053 손실보상금	수용보상금 증액청구	김일래	익산시	2020.5.6.	화해권고결정 법원갑정평가 증가액 지급 (5,000천원 / 2021.3.5.)
전주(군산) 2020 가단58838 토지 및 건물인도	철거이주대상자 명도소송 진행	익산시	최영무	2020.11.26.	소송진행중 (이주준비중)
전주(군산) 2020 가단58845 토지 및 건물인도	철거이주대상자 명도소송 진행	익산시	최전호	2020.11.26.	소송진행중 (2021.10. 이주예정)
전주(군산) 2020 가단58883 토지 및 건물인도	철거이주대상자 명도소송 진행	익산시	김일래	2020.11.27.	소송진행중 (2021.4. 이주예정)

30. 시홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		고도육성계장		조승재	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

□ 민원접수 현황

(단위 : 건)

접수(건)			처리(건)			비고
계	시정에바란다	국민불편신고	계	시정에바란다	국민불편신고
16	16		16	16

□ 시정에 바란다

❍ 문화재 봉사활동 실적 인정 문의 (2020. 1. 14.)

▸게시내용 : 문화재 봉사활동 실적 인정 문의

▸답변내용  : 봉사활동 실적을 인정해주는 1365 자원봉사센터 시스템이 구축되어 있으며, 2020. 1. 20. 익산시 자원봉사센터에 수요처 등록이 완료되었으므로 정식 문서로 재요청시 실적인정 진행을 도와드리도록 하겠으며 절차상 불편을 드린 점 양해드림

❍ 미륵산 등산로 화장실 문의 (2020. 3. 24.)

▸게시내용 : 미륵산 등산로 화장실 이용 불편 문의

▸답변내용  : 화장실 물이 나오지 않는 문제는 3. 24. 현장출장하여 수리 완료하였으며, 지속적으로 관리하겠음

❍ 국가무형문화재 통합전수교육관 지하주차장 이용 (2020. 5. 4.)

▸게시내용 : 국가무형문화재통합전수교육관 지하주차장 이용 문의

▸답변내용  : 지하주차장은 입주단체의 각종 공연 관련 인력과 장비를 위한 시설인 관계로 이용에 어려움이 있어, 방문객 전용 주차시설(야외주차장)을 안내함

❍ 익산문화재야행 운영 관련 (2020. 5. 13.)

▸게시내용 : 공연 출연료 미지급 관련

▸답변내용  : 해당 단체 대표자 명의로 입금되었으며, 차후 동일 사례가 발생하지 않도록 안내하겠음

❍ 국립익산박물관 계단 난간 이용 불편 (2020. 5. 17.)

▸게시내용 : 국립익산박물관 계단 이용 불편

▸답변내용  : 관리 주체인 국립익산박물관에 민원사항을 즉시 송부함

❍ 익산문화재야행 관련 (2020. 7. 14. / 7. 31. / 8. 3.)

▸게시내용 : 익산 문화재야행 개최 관련

▸답변내용  : 행사 관련 코로나19 감염증 방역대책 안내

❍ 미륵사지 전기차충전소 및 우기시 배수로 문제 (2020. 7. 24.)

▸게시내용 : 관람하는 동안 전기차충전장소 누락 및 우기시 배수로 문제 문의

▸답변내용  : 국립익산박물관 측에 문의 결과 전기차 충전시설 설치 검토중이며 미륵사지 관광지 조성 완료시 주차장에 충전시설 검토중, 유적지 내 배수시설 개선을 위해 지속적인 정비 및 탐방객 편의를 위한 보행매트 설치 추진중임을 안내

❍ 미륵사지 별장한증막 화장실 시설 서비스 엉망 (2020. 8. 6.)

▸게시내용 : 별장한증막 화장실 세면대 및 천장 전구 파손, 손소독제 및 비누 비치 요청

▸답변내용  : 천장 전구 및 세면대 수리 완료 및 코로나19 예방조치를 위한 고정형 비누 거치대 설치하였음

❍ 문화재 홍보 관련 (2020. 8. 30.)

▸게시내용 : 문화재 홍보방안 건의

▸답변내용  : 스크린 안내판, 가상 안내판 등의 도입을 검토중에 있음을 안내

❍ 미륵산(과학고등학교 방향) 계단 보수 요청 (2020. 9. 3.)

▸게시내용 : 등산로 계단 안전테이프 조치 대신 보수 요청

▸답변내용  : 안전사고 방지를 위해 안전테이프 조치 설치한 것이며, 현재 탐방로 정비공사 예정으로 요청하신 사항을 우선적으로 보수 실시

❍ 백제왕궁 ICT역사관 관련 (2020. 9. 9.)

▸게시내용 : 백제왕궁 ICT역사관 전시물 제작설치사업 입찰 관련 문의

▸답변내용  : 공정한 업체선정을 위해 조달청 계약 및 제안서 평가 의뢰함. 입찰절차 및 업체선정방식은 조달청에 문의 요청, 입찰가격 사항에 대해 계약예규 및 조달청 세부기준에 의거 가격평가점수 비율 20%에서 10%로 낮춰 저가투찰 방지되도록 조달청과 협의하겠음

❍ 국립익산박물관 재개관 대상에서 제외 요청 (2020. 9. 29.)

▸게시내용 : 추석 명절 기간 국립익산박물관 재개관 대상에서 제외

▸답변내용  : 국립익산박물관은 국립중앙박물관 휴관 조치 종료에 따라 9월 29일부터 재개관하였으며 사전 예약제를 통한 관람객 집중 방지, 시설물 소독을 통하여 코로나19 확산 방지에 만전을 기할 예정임

❍ 미륵사지 쉼터 화장실 파손 (2020. 10. 11.)

▸게시내용 : 미륵사지 쉼터 화장실 변기 파손

▸답변내용  : 파손 문제에 대해서는 수리 완료하여 정상 작동하고 있음

❍ 익산의 뜻 문의 (2020. 10. 19.)

▸게시내용 : 익산시청 홈페이지에서도 익산의 뜻을 찾지 못하여 문의

▸답변내용  : ‘익산(益山)’은 ‘산이 더해지다’라는 뜻임. 고려시대에는 ‘익주(益州)’였으며, 조선 태종(13년)에 전국 행정구역을 8도로 개편하면서 ‘주(州)’로 끝나는 고을이 너무 많아 격에 맞지 않는다고 하여 그 중 일부를 ‘산(山)’이나 ‘천(川)’으로 개칭하면서 ‘익주(益州)’를 ‘익산(益山)’으로 명칭을 변경하였습니다. 그리고 1995년 ‘이리시’와 ‘익산군’ 통합시 ‘익산(益山)’이라는 지명이 역사적으로 오래되었던 점과 이 지역의 대표 지명이라는 점에서 익산시를 통합시 명칭으로 하였음

❍ 익산근대역사관 버스킹 공연 관련 (2020. 11. 3.)

▸게시내용 : 익산근대역사관 야외광장에서 타 지역 예술인의 버스킹 공연 불허 요청

▸답변내용  : 익산근대역사관 야외광장은 익산시민과 문화예술의거리, 역사관을 방문하는 타 지역 관람객 등 모든 사람을 위한 문화행사 및 공연공간으로 활용하고 있으며, 다양한 공연 및 행사 개최로 많은 사람이 우리시와 역사관 등을 방문할 수 있도록 시설대관 신청자 및 공연자의 출신지역을 제한하고 있지 않음

❍ 미륵산 사자암 내 음용수대 고장수리 요청 (2020. 11. 18.)

▸게시내용 : 미륵산 사자암 내 음용수용 전기모터 고장 수리 요청

▸답변내용  : 음용수용 전기모터 고장 관련은 현재 수리중에 있으며, 조속히 수리하겠음

31. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

□ 민간위탁현황

시설명	수탁기관	위‧수탁 금액	동의 관련			비 고
			의회동의여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
익산 기세배전수 교육관	익산기세배 보존회		부 (익산기세배 전수교육관 운영조례 제6조)		2020.1.1.~ 2020.12.31	조례에 따른 익산 기세배 보존회에 위탁

□ 민간위탁 지도점검 현황

시설명	수탁 기관	점검 근거	점검 일자	점검 내용	지적 사항	조치 결과 (수탁기관)	비고
익산 기세배 전수 교육관	익산 기세배 보존회	익산기세배전수교육관운영조례 제8조	2020.4.22	시설 및 운영관리	코로나19 예방수칙 이행안내
익산 기세배 전수 교육관	익산 기세배 보존회	익산기세배전수교육관운영조례 제8조	2020.12.12	시설 및 운영관리	없음

32. 의견제시에 대한 의회 의견 반영 결과

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

33. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□

(단위 : ㎡, 천원)

사 업 명	승인 사항			추진 사항		비고
	구분	면적	승인액	집행액	미집행 사유
계 (4개 사업)		30,316	18,199,000	1,508,766
고도지구 탑리마을 주거경관개선사업	토지	7,551	448,000	1,920	문화재 보호구역 조정 이후 추진	추진중
고도지구 탑리마을 주거경관개선사업	건물	100	200,000	0	문화재 보호구역 조정 이후 추진	추진중
세계유산 탐방거점 센터 건립사업	토지	17,565	4,551,000	1,506,846	토지 보상 진행중
세계유산 탐방거점 센터 건립사업	건물	5,100	13,000,000	0	건축설계공모 추진 진행중

34. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

35. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

해   당   없   음

36. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

(단위 : 천원)

협 약 명	체결일자	대 상	예산수반 여부	주요내용 (재정지원 등)	비고
공공개발용 토지 비축을 위한 업무협약서 (미륵사지 고도골격 회복사업)	2020.12.18.	한국토지 주택공사	여	미륵사지 문화재구역 토지매입

감사자료 과 요구사항

1. 익산 역사문화도시 조성 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□
		백제왕도계장		이은영	□
		문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. ~ 2025.

◦ 사 업 비 : 6,283,000천원(국비 1,419,000 도비 1,389,000 시비 3,475,000)

▸2020년 예산 : 1,079,000천원(도비 476,000 시비 603,000)

◦ 사업내용

▸백제무왕 관련 학술분야 기반 강화 및 거점 역사문화공간(조형물 등) 조성

▸익산역사문화도시 지정을 위한 문화특화지역 조성사업

▸역사문화자원 콘텐츠 개발 및 유적 발굴 조사 등 역사문화도시 기반 조성

□ 추 진 실 적

◦ 무왕도시 역사문화공간 조성 추진계획 수립 및 자문회의(3회)	: 2020. 1. ~ 12.

◦ 문화특화지역(문화도시)조성사업 추진	: 2020. 1. ~ 12.

▸시민이야기주간, 문화도시 포럼, 왕도정원 가꾸기, 프리마켓 이리오숍 운영 등

◦ 황등제 제방 확인 시‧발굴조사	: 2020. 2. ~ 12.

◦ 익산소재 박물관 연합도록 발간	: 2020. 3. 20. ~ 12. 20.

▸대상 : 5개(국립익산박물관, 왕도역사관, 마한박물관, 입점리고분전시관, 원광대학교박물관)

◦ 익산 역사문화 고문서 발간(용안현·여산부읍지, 함열현읍지)	: 2020. 9.

◦ 법정문화도시 예비도시 선정	: 2020. 12. 24.

□ 향 후 계 획

◦ 역사문화자원 콘텐츠 개발 및 학술분야 기반 강화를 위한 학술대회	: 2021. 4. ~ 12.

▸마한문화권 가치 확산 외 3회

◦ 법정 문화도시 예비사업 추진	: 2021. 4. ~ 12.

◦ 익산 역사문화 고문서 번역(금마일기, 금마별가 등)	: 2021. 4. ~ 12.

◦ 백제왕궁 다큐멘터리 제작	: 2021. 4. ~ 12.

2. 세계유산 보존관리 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

	백제역사유적지구 유네스코 세계유산 등재현황
◦ 유 산 명 : 백제역사유적지구(Baekje Historic Areas) ◦ 지 정 일 : 2015. 7. 8. ◦ 대상유적 : 왕궁리유적, 미륵사지 ‣공주(2개소) 공산성, 송산리고분군 ‣부여(4개소) 관북리유적과 부소산성, 정림사지, 능산리고분군, 나성 ◦ 사업주체 : 전라북도, 충청남도, 익산시, 공주시, 부여군 / (재)백제세계유산센터

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 737,400천원(국비 360,000 도비 60,000 시비 317,400)

◦ 사업내용 : 세계유산 국내·외 교류 활성화, 체계적인 보존관리, 확장등재 등

□ 추 진 실 적

◦ 국내□외 세계유산 도시간 협력강화

▸한국세계유산도시협의회 23차 정기회의 참석(경주시 11.26.)

▸익산시 한국세계유산도시협의회 11대 회장도시 선출(회원도시 : 22곳)

◦ 세계유산 체계적인 보존관리사업

▸세계유산 녹지 생육환경개선사업(백제왕궁, 미륵사지)

▸세계유산 관람객 편의를 위한 음수대 설치(2곳)

▸세계유산 통합방범시스템 상시운영(CCTV 23대)

▸미륵사지 IOT재난방재시스템 구축공사(CCTV 6대, IOT카메라 등)

▸세계유산 관람환경개선 상시인력 운영(백제왕궁 3명, 미륵사지 3명)

▸세계유산 모니터링 시스템 요원 운영(2명)

◦ 세계유산 가치 확대를 위한 학술연구

▸백제역사유적지구 단위 유산 보존관리 현황연구

▸백제역사유적지구 학술연구 총서 제작(확장등재 대상유산)

▸백제역사유적지구 학술포럼 개최(부여롯데리조트 9.15. / 50여명 / 온라인)

□ 향 후 계 획

◦ 세계유산의 책임있는 보존 관리 추진	: 연중 수시

3. 세계유산 활용 홍보 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 240,180천원(시비)

◦ 사업내용 : 세계유산 홍보 강화 및 세계유산 활용·홍보 추진

□ 추 진 실 적

◦ 세계유산 국내외 홍보 강화

▸세계유산 캠페인 광고(익산역, 용산역)	: 2020. 1. ~ 2021. 1.

-역내 옥외 전광판을 활용하여 ‘유네스코 세계유산 도시 백제왕도 익산’ 홍보

▸세계유산 홍보 책자 제작

-세계유산 홍보용 리플릿(8,000부), 세계유산 전문가 해설서(500권), 유적 따라

이야기 따라 뚜벅뚜벅 익산 한국어판(2,300부) 등

▸세계유산 홍보 기념품 제작

-미륵사지 석탑 기념품, 사리장엄구 기념품, 사리장엄 방향제, 열쇠고리 등

◦ 세계유산의 다양한 활용 및 홍보사업 추진

▸문학인과 함께하는 백제역사문화 탐방 운영	: 2020. 7. 11. ~ 7. 12.

-백제왕궁, 미륵사지, 나바위성당 등 탐방

◦ 백제문화유산주간 운영	: 2020. 10. 19. ~ 10. 25.

▸백제문화유산 녹턴 개최(미륵사지, 국립익산박물관)	: 2020. 10. 24.

□ 향 후 계 획

◦ 세계유산의 책임있는 보존□활용을 통한 문화향유 참여 프로그램 확대	: 연중 수시

4. 백제세계유산센터 연계사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

	백제세계유산센터 현황
◦ 설립허가 :‘12년 4월 18일(문화재청 제2012-4호) /‘12년 5월 3일(등기) ◦ 설립목적 : 유네스코 세계유산 유산의 보존․관리 및 확장등재 ◦ 대 표 자 : 충남도 문화체육부지사 * 兩 道 이사장 1년씩 순차 보직 ◦ 조 직 : 이사회(11명), 감사(3명), 자문위원회(15명), 사무국(10명)

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 477,336천원(국비 238,668 도비 71,600 시비 167,068)

◦ 사업내용 : (재)백제세계유산센터 연계, 세계유산의 다양한 활용・홍보사업

□ 추 진 실 적

◦ 백제문화유산주간 홈페이지 구축·운영	: 2020. 3. ~ 11.

◦ 백제문화유산주간 사진콘테스트 및 홍보부스 운영	: 2020. 10. 19. ~ 10. 25.

◦ 백제역사유적지구 레고 체험 프로그램 운영(익산)	: 2020. 10. 17. ~ 10. 18.

◦ 백제역사유적지구 컬러링북 제작(4,500부)	: 2020. 11.

◦ 프로그램 제작 지원(‘퀴즈 온 코리아’ 방영)	: 2020. 10. 9.

▸퀴즈 서바이벌 프로그램을 백제역사유적지구 테마로 제작(90분/KBS1TV)

◦ 백제역사유적지구 팸투어 실시(10회/187명)	: 2020. 7. 9. ~ 12. 4.

▸국내 팸투어(문화관광 관련 언론인, 문화재 관련 대학생, 여행사 관계자 등)

◦ 백제역사유적지구 국외 사진전시회 개최(2회/그리스, 인도네시아)

◦ 백제역사유적지구 랜선역사 탐방(익산편)	: 2020. 9. 9.

▸VCR 탐방, 쌍방향 연사 강연, 토크쇼 등

◦ 백제역사유적지구 사생대회 개최

▸접수기간 : 8. 10. ~ 8. 14. / 응모현황 : 총 150명(익산 : 63명)

◦ 백제역사유적지구 퀴즈왕 선발대회 개최(비대면)	: 2020. 9. 4.

◦ 백제역사유적지구 홍보차량 운영(익산)

▸익산문화재 야행(8.7.~8.9.), 백제문화유산 녹턴(10.24.), 백제왕궁 소원등 날리기(10.31.)

◦ 백제역사유적지구 사이버전시관 구축	: 2020. 2. ~ 12.

□ 향 후 계 획

◦ 세계유산 보존□정비□활용 거버넌스 체계 구축	: 연중 수시

5. 익산 고도보존육성사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 금마면․왕궁면 일원 / 3.1㎢(특별보존지구1.8 보존육성지구 1.3)

◦ 사업기간 : 2012. ~ 2025.

◦ 총사업비 : 341,850,000천원(국비 189,250,000 도비 62,535,000 시비 62,535,000 기타 27,530,000)

-고도보존 168,590,000천원, 고도육성 170,660,000천원, 주민참여 2,600,000천원

※ 고도육성사업 : 170,660,000천원(국 72,210,000 도 35,460,000 시 35,460,000 기타 27,530,000)

-기   투   자 :  36,403,000천원(국 20,958,000 도  3,863,000 시 11,582,000)

-2 0 2 0 년 :   3,640,000천원(국    881,000 도    648,000 시  2,111,000)

□ 추 진 실 적

◦ 고도 이미지 찾기사업(한옥, 담장) 추진	: 2015. ~ 현재

▸한옥(51건), 담장(42건) 완료 / 2020년 한옥(9건), 담장(6건) 준공

◦ 이주단지 고도 이미지 찾기사업(자체재원) 추진	: 2017. ~ 현재

▸한옥(14건), 담장(12건) 완료 / 2020년 한옥(5건), 담장(7건) 준공

◦ 금마면사무소 이전사업(이후 객사,관아터 발굴)토지매입 추진	: 2017. ~ 2020.

▸2020년 총 9필지 2,559㎡ 매입완료 / 이주촉구 및 철거중

◦ 서동 역사공원 조성사업 추진	: 2018. 4.  ~

▸도시계획시설(공원)결정용역 및 토지보상계획 열람공고

◦ 금마고도지구 가로경관개선 사업	: 2017. 1. ~

▸고도지구 1~4단계별 간판정비사업 완료(고도길, 금마길 203개소) / 2020년 81개소 완료

▸익산 향교 일원 인도(가로변) 정비사업 완료 / 2020년 6월 완료

▸익산고등학교 담장정비사업 추진중(전통담장 및 협문설치) / 2020년 실시설계 완료

◦ 금마 전선지중화 준공정산 추진(완료)	: 2019. 5. ~ 2020.

◦ 익산 세계유산탐방거점센터 건립	: 2019. 12. ~

▸종합정비계획수립용역 완료, 토지보상 시행 [총 15필지 중 5필지 매입(30%)]

◦ 전북도 아름다운 주거 경관개선 공모사업 선정(왕궁탑리마을)	: 2020. 3. ~ 현재

▸실시설계용역 추진(2020. 7. 24. ~ 2021. 2. 2.)

□ 향 후 계 획

◦ 익산고도보존육성 기본계획에 의거 단계별 정비 추진	: 연중 수시

6. 문화유산 보존관리(정비) 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□
		미래유산계장		한정희	□

□ 문화재 현황

합 계	국가지정문화재							전라북도지정문화재						국 가 등 록 문화재	향토유적
	소 계	국 보	보 물	사 적	국가 민속	천 연 기념물	무 형 문화재	소 계	유 형 문화재	무 형 문화재	기념물	민 속 문화재	문화재 자 료
121	24	3	10	7	1	1	2	55	18	7	15	1	14	21	21

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 총사업비 : 32개 사업 10,913,810천원(국비 6,365,000 도비 2,246,405 시비 2,302,405)

▸국가지정 : 쌍릉 정비 등 13개 사업 9,470,000천원

▸도  지정 : 여산 숲정이 순교성지 정비 등 15개 사업 991,000천원

▸기    타 : 국가지정 목조문화재(김병순 고택 등 3개소) 재난방지시설 구축 360,000천원 도지정 목조문화재(망모당 외 10개소) 재난관리시스템 구축 92,810천원

□ 추 진 실 적

◦ 정비사업 설계용역 등 추진	: 2020. 1. ~ 4.

◦ 문화재청 및 전북도 설계승인	: 2020. 4. ~ 5.

◦ 정비사업 추진	: 2020. 5. ~ 12.

▸완료 27건, 시행중 5건

◦ 정비사업 완료	: 2020. 12.

(단위 : 건)

구 분	건수	내 용
계	32
사업완료	27	‣ 국가지정 및 등록문화재(9) : 숭림사 보광전, 연동리 석조여래좌상(정밀실측, 불단정비), 쌍릉, 충간공 보물 제651호 박물관, 김병순 고택, 구 익옥수리조합, 원불교 익산성지, 나바위 성당 ‣ 도지정 문화재(15) : 여산숲정이순교성지, 이병기선생생가, 성당면 은행나무 외 3개소, 두동교회 구 본당, 심곡사 명부전, 문수사 대웅전, 함벽정, 익산향교 대성전, 여산향교 대성전, 함열향교 대성전, 용안향교 대성전, 여산동헌, 이배원가옥, 태봉사 삼존석불, 금마도토성 ‣ 목조문화재 재난방지시설 구축(2) : 김병순 고택, 나바위 성당 ‣ 목조문화재 재난관리시스템 구축(1) : 망모당 외 10개소
시 행 중	5	‣ 국가지정 및 등록문화재(4) : 입점리고분, 관음사 목조보살입상, 심곡사 칠층석탑 출토 유물, 익산 솜리근대역사문화공간 ‣ 목조문화재 재난방지시설 구축(1) : 김병순 고택

□ 향 후 계 획

◦ 역사문화자원의 보존□활용을 위한 문화유산의 관광자원화	: 연중 수시

◦ 문화재 보수정비 사업

(단위 : 백만원)

구분	문 화 재 명 (사업명)	사 업 내 용	사업비	비 고
				설계중	설계승인	공사중	완 료
계	32개 사업		10,914			5	27
국 가 지 정 문 화 재 및 등 록 문 화 재	13개 사업		9,470			4	9
	익산 숭림사 보광전	보광전 전면계단 및 기단, 앞마당 정비	80				○
	익산 입점리고분	전시관 보수	600			○
	익산 연동리 석조여래좌상	정밀실측조사	80				○
		불단정비, 좌대 보존처리 및 3D스캔	80				○
	익산 쌍릉 정비	발굴지 정비, 토지매입	4,200				○
	연안이씨 종중문적	육각정 보수설계	150				○
	익산 관음사 목조보살입상	보호각 건립	1,500			○
	심곡사 칠층석탑 출토유물	수장고 건립	1,200			○
	익산 김병순고택	종합정비계획 수립 및 행랑채 보수 등	360				○
	익산 구 익옥수리조합 사무소와 창고	사무소와 창고 보수정비	50				○
	원불교 익산성지	구정원 지붕보수 및 기둥·인방재보수	70				○
	익산 솜리근대역사문화공간	종합정비계획, 근대 건축자산 기초조사	800			○ (용역중)
	익산 나바위 성당	탐방로정비	300				○
도지정문화재	15개 사업		991				15
	여산 숲정이 순교성지	성토부지 정비 및 조경식재	476				○
	이병기 선생생가	초가이엉잇기(연2회)	50				○
	성당면 은행나무 외 3개소 방제	방제용역 및 유지관리	5				○
	두동교회 구 본당	전면바닥 정비	10				○
	심곡사 명부전	명부전 종각 기와보수	39				○
	문수사 대웅전	위험수목 정비 및 고사목 제거	5				○
	함벽정	화장실 리모델링 및 소화전 설치	77				○
	익산향교 대성전	소화전 설치	25				○
	여산향교 대성전	소화전 설치 및 창호복원	29				○
	함열향교 대성전	소화전 설치	27				○
	용안향교 대성전	담장보수, 식생매트 설치, 소화전 설치	55				○
	여산동헌	소화전 설치	26				○
	이배원 가옥	창고철거	11				○
	태봉사 삼존석불	원형복원 고증연구	75				○
	금마도토성	수목 및 잡목정비	81				○
국가지정 재난 방지	3개 사업		360			1	2
	익산 김병순고택 재난방지시설 구축	소방시설 개선	200			○
	익산 김병순고택 ICT 구축	전기화재예방 시스템구축(ICT)	70				○
	익산 나바위성당 ICT 구축	전기화재예방 시스템구축(ICT)	90				○
도지정 재난 관리	1개 사업		93				1
	도지정 목조문화재 재난 관리시스템 구축	망모당 외 10개소	93				○

7. 백제왕궁(왕궁리유적) 보수정비 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30번지 일원

◦ 사업기간 : 2007. ~ 2022. (16년)

◦ 사 업 비 : 51,981,160천원(국비 32,950,101 도비 9,515,029 시비 9,516,030)

▸2012년 이전 : 발굴지(건물지) 정비, 종합정비계획 수립 등

▸2013년 이후 : 종합정비계획에 따라 발굴지 순차 정비

◦ 2020년 사업

▸사 업 비 : 842,857천원(국비 590,000 도비 126,428 시비 126,429)

▸사업내용 : 발굴지 정비 및 유적보호시설 설치 설계, 북측관리센터 조성

□ 추 진 실 적

◦ 발굴지 토지매입 및 발굴	: 1989. ~ 현재

◦ 왕궁리 유적전시관 건립	: 2002. ~ 2007.

◦ 발굴 진행 및 완료지역 단계별 유적 정비 중	: 2007. ~ 현재

□ 2020년 정비사업 추진사항

◦ 유적지 정비사업 : 발굴지 정비 및 유적보호시설 설치 설계

▸사업비 : 142,857천원(국비 100,000 도비 21,428 시비 21,429)

▸2020년 왕궁리유적 정비 설계	: 2020. 2. ~ 2020. 12.

◦ 북측관리소 조성 : 이동식 사무실 및 화장실 설치, 잔디블록 설치, 조경식재 등

▸사업비 : 700,000천원(국비 490,000 도비 105,000 시비 105,000)

▸북측관리센터 조성공사	: 2020. 3. ~ 2020. 6.

□ 향 후 계 획

◦ 백제왕도핵심유적 정비 계획에 따라 단계별 추진	: 연중 수시

8. 미륵사지 보수정비 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 금마면 기양리 97번지 일원

◦ 사업기간 : 2008. ~ 2038.

◦ 사 업 비 : 210,258,000천원(국비 147,181,000 도비 31,538,500 시비 31,538,500)

▸미륵사 복원 고증 기초연구(안) / 2010년, 국립문화재연구소

◦ 사업내용 : 목탑, 금당, 강당, 회랑 등 주요 건물 복원 등

< 연도별 추진계획 >                       (단위 : 백만원)

구분	연도별	사업내용	사업비	비고
합 계			210,258
1 단계 (2018년 ∼ 2021년)	소 계		17,120	심화연구 : 1,900 복원정비 : 15,220
	2018년	․ 미륵사 복원 심화연구 (계속) ․ 배수시설, 기단부 복원․정비 (계속) ․ 미륵사지 회랑지 복원 설계	3,260	심화연구 : 500 복원정비 : 2,760
	2019년	․ 미륵사 복원 심화연구 (계속) ․ 미륵사지 금당, 강당 복원 설계 (계속) ․ 회랑 복원공사 추진	4,441	심화연구 : 100 복원정비 : 4,341
	2020년	․ 미륵사 복원 심화연구 (계속) ․ 미륵사지 복원 설계 (계속) ․ 회랑, 중문, 금당, 강당 복원공사 (계속)	5,150	심화연구 : 1,300 복원정비 : 3,850
	2021년	․ 미륵사 복원 심화연구 ․ 목탑, 강당, 승방 등 복원 설계 (계속) ․ 회랑, 중문 복원공사 (계속)	4,269	복원정비 : 4,269
2 단계 (2022∼2038년)		․ 목탑, 금당, 강당 등 주요건물 복원 추진 (건물의 전체적인 복원은 변경 될 수 있음)	193,138	복원정비

◦ 2020년 사업

▸사 업 비 : 5,150,000천원(국비 3,605,000 도비 772,500, 시비 772,500)

▸사업내용 : 기단부 정비, 탐방로 정비, 가마터 보호각 개보수, 토지매입, 복원정비연구

□ 2020년 정비사업

◦ 금당지 기단부 정비 : 1,000,000천원(국700,000 도150,000 시150,000)

▸2020년 미륵사지 정비공사 설계	: 2020. 2. ~ 2020. 7.

▸2020년 미륵사지 정비공사	: 2020. 9. ~ 2021. 9.

◦ 미륵사지 탐방로 정비 : 450,000천원(국315,000 도67,500 시67,500)

▸익산 미륵사지 탐방로 정비공사 설계	: 2020. 2. ~ 2020. 6.

▸익산 미륵사지 탐방로 정비공사	: 2020. 6. ~ 2020. 12.

◦ 조선시대 가마터 보호각 개보수 : 900,000천원(국630,000 도135,000 시135,000)

▸익산 미륵사지 가마터 보호각 개보수공사	: 2020. 6. ~ 2021. 2.

◦ 미륵사지 토지매입 : 1,500,000천원(국1,050,000 도225,000 시225,000)

◦ 복원정비연구(5차) 3차 지급 : 1,300,000천원(국910,000 도195,000 시195,000) / 공기관대행사업

□ 향 후 계 획

◦ 백제왕도핵심유적 정비 계획에 따라 단계별 추진	: 연중 수시

9. 문화재 활용사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사 업 비 : 935,300천원(국비 374,000 도비 142,350 시비 418,950)

구분	문화재 야행	향교·서원 문화재 활용	생생문화재	세계유산 활용 프로그램	지역문화유산교육
계	414,300	120,000	55,000	300,000	46,000
국비	131,000	48,000	22,000	150,000	23,000
도비	58,950	21,600	9,900	45,000	6,900
시비	224,350	50,400	23,100	105,000	16,100

◦ 사업내용 : 9개 사업(문화재 야행사업, 향교·서원 문화재 활용사업, 생생문화재 사업, 세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프, 백제왕궁 소원등 날리기, 백제왕궁 토요 야간상설공연, 박물관을 품은 미륵사지, 드론을 활용한 역사체험 프로그램, 지역문화유산교육사업)

□ 추 진 실 적

◦ 다양한 문화재활용 콘텐츠 개발 및 프로그램 운영

▸문화재 야행(夜行) 사업(백제왕궁/1회/10,000여명)	: 2020. 8. 7. ~ 8. 9.

▸향교․서원 문화재 활용사업(함열향교/22회/565명)	: 2020. 4. ~ 11.

▸생생문화재 사업(쌍릉, 백제왕궁, 미륵사지/19회/485명)	: 2020. 4. ~ 11.

▸세계유산 활용 프로그램 사업(5개 사업)	: 2020. 4. ~ 11.

-세계유산 백제왕궁 천년별밤캠프(백제왕궁, 미륵사지/8회/415명)

-백제왕궁 소원등 날리기(백제왕궁/1회/800여명)

-백제왕궁 토요 야간상설공연(백제왕궁/12회/1,200여명)

-박물관을 품은 미륵사지(백제왕궁, 미륵사지/44회/7,786여명)

-드론을 활용한 역사체험 프로그램(백제왕궁, 미륵사지/20회/275명)

▸지역문화유산교육사업(관내 초·중학교/34회/819명)	: 2020. 5. ~ 12.

◦ 2021년 문화재청 공모사업 선정(6건/3,253백만원)

▸지역문화재 활용 사업 2건(문화재 야행사업, 향교․서원 문화재 활용사업)

▸세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)

▸세계유산 활용 프로그램 사업(백제역사유적지구)

▸세계유산 활용 콘텐츠 구축(미디어파사드)

▸세계유산축전(백제역사유적지구)

□ 향 후 계 획

◦ 2021년 문화재 활용사업 추진	: 2021. 4. ~ 11.

◦ 2022년 문화재청 문화재 활용 공모사업 신청	: 2021. 7. ~ 8.

10. 국립익산박물관 건립사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 금마면 기양리 104-1

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2020. (국립익산박물관 건립후 사회교육관 개축)

◦ 사업규모 : 부지면적 39,695㎡, 건축연면적 10,000㎡(건립 7,500㎡, 개축 2,500㎡)

◦ 총사업비 : 37,169,000천원

(전시관 건립 28,480,000  사회교육관 개축 8,689,000)

□ 추 진 실 적

◦ 국립익산박물관

▸국립익산박물관 건설공사 기본계획 수립        : 2015. 2. ~ 6.

▸미륵사지 유물전시관 국립 승격                : 2015. 12.

▸국립익산박물관 건립 실시설계 완료            : 2017. 7.

▸국립익산박물관 건립 준공 및 개관             : 2019. 12. ~ 2020. 1.

◦ 사회교육관(어린이박물관 및 보존과학동 신설)

▸사회교육관 설계용역 발주	: 2019. 1.

▸사회교육관 설계 추진                          : 2019. 10. ~ 12.

▸사회교육관 착공                               : 2021. 1.

□ 향 후 계 획

◦ 사회교육관 공사 추진	: 2021. 1. ~

▸“미륵사지 시간여행 탐험” 어린이박물관 4월 중 전시공사 추진

◦ 사회교육관 준공 및 운영	: 2021. 12.

11. 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 562번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2021.

◦ 사 업 비 : 13,957,050천원(국비 4,187,115 도비 4,884,967 시비 4,884,968)

▸2019년 :   700,000천원(국비   210,000 도비   245,000  시비   245,000) - 설계비

▸2020년 : 5,366,667천원(국비 1,610,000 도비 1,878,334 시비 1,878,333) - 공사(1차)

▸2021년 : 7,890,050천원(국비 2,367,015 도비 2,761,517 시비 2,761,518) - 공사(2차)

◦ 사업내용 : 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성

▸전시공간 확대 및 수장기능보강, 가상체험관(AR, VR, 홀로그램 등) 설치

▸건물면적 : 4,206.33㎡ / 1,275평(기존 : 2,349.78㎡ / 712평, 증축 : 1,856.55㎡ / 563평)

□ 추 진 실 적

◦ 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 설계용역비(700,000천원) 확보	: 2019. 1.

◦ 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 설계용역 착수	: 2019. 5. ~ 6.

◦ 2020년 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 예산확정(5,366,667천원)	: 2019. 12.

◦ 백제왕궁 역사관 증축 및 가상체험관 건립 건축공사 착공	: 2020. 8.

◦ 2021년 백제왕궁 역사관 및 가상체험관 조성 예산확정(7,890,050천원)	: 2020. 12.

◦ 백제왕궁 역사관 증축 및 가상체험관 전시물 제작설치 착수	: 2020. 12.

□ 향 후 계 획

◦ 백제왕궁 역사관 증축 및 가상체험관 공사완료 및 개관	: 2021. 12.

12. 국가무형문화재통합전수교육관 운영 및 관리현황

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	역사도시계장		김흥순	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산대로21길 1-9 (김동문 배드민턴장 인접)

◦ 개 관 일 : 2016. 9. 22. (준공일 2016. 8. 10.)

◦ 규    모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

◦ 주요시설 : 실내공연장, 다목적 소공연장, 세미나실, 사무실 등

◦ 입주단체 : 이리농악, 이리향제줄풍류, 시립풍물단

□ 운 영 실 적

◦ 무형문화재 전수 프로그램 운영

단 체 명	전수교육관 활성화사업	전수교육 육성사업	비고
이리농악	사회교육(주1회)	판굿 등 7개과정
이리향제줄풍류	사회교육(주1회), 상설공연(6회)	가야금 등 5개과정

◦ 주요시설 대관 현황

(단위 : 건/명)

구 분	이 용 현 황			사용료(원)
	계	무 료	유 료
계	61 / 2,874	58 / 2,454	3 / 320	310,000
세미나실	22 / 543	22 / 543	-	-
다목적 소공연장	-	-	-	-
실내공연장	39 / 2,331	36 / 1,911	3 / 320	310,000

□ 향 후 계 획

◦ 전수교육 육성사업(이리농악, 이리향제줄풍류)	: 2021. 1. ~ 12.

◦ 전수교육관 활성화 사업(이리향제줄풍류)	: 2021. 4. ~ 12.

13. 국보문화재 홍보디자인 원천소스 제작사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	백제왕도계장		이은영	□

□ 사 업 개 요

◦ 대상문화재 : 미륵사지 석탑‧사리장엄구, 왕궁리오층석탑‧사리장엄구 등

◦ 사 업 기 간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.

◦ 사  업  비 : 150,000천원(국비 75,000 도비 22,500 시비 52,500)

◦ 사 업 내 용 : 국보 문화재의 고유하고 우수한 특색을 담아낸 특징적 요소 발굴

▸기본 문양 디자인 원형 제작, 문양 디자인 개발, 활용방안 제시, 시제품 제작

□ 추 진 실 적

◦ 자료 수집 및 분석

▸미륵사지 석탑, 미륵사지 석탑 출토 사리장엄구, 왕궁리오층석탑, 왕궁리오층석탑 사리장엄구 역사적 자료 분석 및 30가지 이상의 중요 디자인 소재 발굴

◦ 기본 문양 디자인 원형 제작

▸미륵사지 석탑, 미륵사지 석탑 출토 사리장엄구, 왕궁리오층석탑, 왕궁리오층석탑 사리장엄구 문양에 대한 원형 제작(AI파일/134건 발굴)

◦ 문양 응용 디자인 개발

▸미륵사지 석탑, 미륵사지 석탑 출토 사리장엄구, 왕궁리오층석탑, 왕궁리오층석탑 사리장엄구 대상 창의적인 문양 개발(AI파일/69건 발굴)

◦ 3D 디자인 제작

▸미륵사지 석탑, 미륵사지 석탑 출토 사리장엄구, 왕궁리오층석탑, 왕궁리오층석탑 사리장엄구 대상 3D 디자인 제작(4건)

◦ 활용방안 및 시제품 제작

▸미륵사지 석탑, 미륵사지 석탑 출토 사리장엄구, 왕궁리오층석탑, 왕궁리오층석탑 사리장엄구 대상 시제품 제작(활용방안 60여건, 시제품 8종)

□ 향 후 계 획

◦ 기본 문양과 문양 응용 디자인은 누구나 자유롭게 활용(공공누리1유형 지정)

◦ 공공디자인, 기념품 제작, 관광시설물 등에 적극 활용(시홈페이지 게재)

14. 세계유산 탐방거점 건립사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. ~ 2023.

◦ 사 업 비 : 21,450,000천원(국비 15,015,000 도비 1,930,000 시비 4,505,000)

▸2020년 : 2,000,000천원(국비 1,400,000 도비 180,000 시비 420,000) - 토지매입

◦ 사업내용 : 부지조성 18,044㎡, 건축물 4,400㎡

▸고도통합지원센터(역사관, 전망대, 교육장, 주민참여공간, 특산품 판매 등)

▸ICT기술을 활용한 가상체험관 운영 (홀로그램, AR, VR, 4D 등)

▸유적간 연계 환승시설(순환형 마차 등), 생활 SOC 주차장, 기타 편익시설 등

□ 추 진 실 적

◦ 종합정비계획 수립 용역 착수	: 2020. 2. ~

▸고도지역심의 자문(2020.3), 투자심사(2020.4.), 공유재산심의 및 관리계획(2020.6.) 등 행정절차 추진

◦ 건축설계공모 관련 공공건축 사전검토 의뢰(아우리-국토부) : 2020. 6.

◦ 건축설계공모 관련 건축위원회 심의(익산시)	: 2020. 7. ~ 9.

◦ 감정평가 및 토지 보상 시행(총 15필지 17,662㎡)	: 2020. 7. ~

◦ 종합정비계획 수립 용역 완료	: 2020. 11.

◦ 전라북도 원가심사(전라북도) 완료	: 2021. 2. 8.

◦ 건축설계공모 공고	: 2021. 3.

□ 향 후 계 획

◦ 문화재 표본조사 진행	: 2021. 4. ~

◦ 건축 설계공모 실시설계 추진	: 2021. 5. ~ 9.

◦ 공사원가 사전검토(조달청)	: 2021. 9. ~ 10.

▸추정가격 100억원 이상인 공사

◦ 공사 착공(단계별 연차사업 추진)	: 2021. 10. ~ 2022. 12.

15. 황등제 제방 확인 시·발굴 조사 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	문화재시설계장		박성일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2021. 4.

◦ 사 업 비 : 130,000천원(시비)

◦ 사업내용

▸황등제의 초축 시기와 변천 과정을 알 수 있는 문헌과 기록 등 기초자료 확보 및 집성 제방으로 추정되는 황등면 황등리 1740번지 일원 시·발굴조사(조사면적 525㎡), 토층 전사(높이 2m, 폭 10m)

□ 추 진 실 적

◦ 황등제 성격과 실체확인 기초학술조사 용역 추진	: 2019. 9. ~ 2020. 1.

◦ 국유재산 사용허가 협의 등 행정절차 이행	: 2020. 1. ~ 2.

◦ 황등제 성격과 실체 확인을 위한 시굴조사 추진	: 2020. 2. ~ 5.

◦ 황등제 제방 실체 확인을 위한 발굴조사 추진	: 2020. 6. ~ 2021. 4.

▸제방 정밀조사 및 정비 기초자료 확보

□ 향 후 계 획

◦ 황등제 제방 실체 확인을 위한 발굴조사 추진	: 2020. 6. ~ 2021. 4.

▸발굴조사 완료 후 토층전사 및 발굴지 복토, 안내판 설치

16. 서동생가터 역사공원 조성사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		배석희	□
작성자	:	고도육성계장		조승재	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 금마면 서고도리 373-14번지 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2023.

◦ 총사업비 : 19,430,000천원(국비 13,600,000 도비 1,750,000 시비 4,080,000)

▸기투자 : 2,876,000천원(시비)

▸2020년 : 1,518,000천원(계속비 1,318,000, 3회추경 200,000)

◦ 계획면적 : 137,000㎡

◦ 사업내용 : 서동생가 재현, 용 조형물, 수변테크 및 전망데크, 연꽃단지 왕궁정원, 산책로, 주차장, 방문객센터 등

□ 추 진 실 적

◦ 익산고도지정지구 변경 고시(문화재청 2017-18호)	: 2017. 2. 7.

▸서동역사공원 조성(보존육성지구 : 137,000㎡ / 194.3억원)

◦ 전북도 지방재정 투자심사(‘17년 제2차 심사 : 조건부)	: 2017. 6. 6.

▸중기지방재정수정 반영, 유지관리비용 최소화, 다양한 콘텐츠 마련 등

◦ 익산시 공유재산심의회	: 2017. 11. 13.

◦ 도시관리계획(도시계획시설/공원) 결정 용역 추진	: 2018. 4. ~

◦ 감정평가 및 보상협의	: 2019. 7. ~

▸총 61필지(93,721㎡ 중 23필지 27,273㎡ 30% 보상완료)

□ 향 후 계 획

◦ 토지수용재결 완료 및 보상금 공탁	: 2021. 3. ~ 5.

◦ 서동생가터 재현 기본계획 및 실시설계용역	: 2021. 4. ~ 9.

◦ 공원조성계획 결정	: 2021. 6.

◦ 서동생가 재현 공사 착공	: 2021. 10.