2021.  7.

제236회 익산시의회(임시회)

― 2021 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 예산집행실적
□	2021 상반기 성과 및 반성
□	2021 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	20		1	4	9	4	2
현 원	22		1	7	9	3	1
증 감	2		-	3	△1	1	△1

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	건설과 소관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의, 시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	지방하천 및 소하천유지관리,국가하천 금강 용안생태습지유지관리,국가하천 만경강 친수시설 유지관리,하천사용료 징수 부과,골채채위허가
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	154.779	168.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	28.169	74.034	27%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
480	408	55	17	243,375	225,941	11,263	6,171

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,278등	19,588등	10,690등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2021 예산집행실적

【 2021. 6. 15. 현재 】                                     (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				42,862,802	15,885,521	26,977,281	37.1
	도로시설관리			20,522,247	10,068,939	10,453,308	49.1
		시군농어촌도로확포장공사		10,557,391	3,378,930	7,178,461	32.0
			금마갈산~서편간도로 확포장공사	463,834	265,825	198,009	57.3	명시200,000 사고163,834
			춘포토다리~덕동간 도로확포장공사	376,050	262,392	113,658	69.8	사고376,050
			미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	13,343	86,657	13.3
			왕궁군도26호선 도로확포장공사	53,948	0	53,948	0	사고 53,948
			금마누동~신촌간 도로확포장	180,000	49,314	130,686	27.4	사고180,000
			시군농어촌도로 확포장사업 추진	10,000	3,170	6,830	31.7
			군도23호 도로확포장공사	3,160,153	1,063,744	2,096,409	33.7	사고 2,160,153
			시군도 도로관리계획및농어촌도로기본계획용역	258,201	32,146	226,055	12.4	사고 98,201
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	958,472	241,078	717,394	25.2	명시 58,472
			오산면소재지 진입도로확포장공사	1,000,000	602,634	397,366	60.3	명시500,000 사고500,000
			황등도선~외화간 도로확포장공사	268,192	205,042	63,150	76.5	사고268,192
			오산역~상아마을간병목구간도로확포장	154,424	0	154,424	0	사고154,424
			하나로~소간촌간 도로확포장공사	497,670	178,155	319,515	35.8	사고497,670
			왕궁양동마을진입도로 확포장공사	300,963	242,675	58,288	80.6	명시17,191 사고83,772
			춘포창평마을 진입도로확포장공사	30,077	0	30,077	0	사고30,077
			왕궁금오동~군도22호간도로확포장공사	244,557	95,994	148,563	39.2	사고244,557
			금마신정~증왕간 도로확포장공사	198,198	81,529	116,669	41.1	사고198,198
			춘포오룡선 도로확포장공사	7,652	1,069	6,583	14	사고7,652
			황등면 하동마을~동연지하차도우회도로개설공사	500,000	0	500,000	0	사고 500,000
			춘포노적선 도로확포장공사	150,000	0	150,000	0	명시 100,000
			시도31호 도로확포장공사	70,000	0	70,000	0	명시 70,000
			백제왕도탐방로조성(익산토성)	1,355,000	0	1,355,000	0	명시 70,000
			오산용연선(모현동장례식장~용곤마을)도로확포장공사	100,000	0	100,000	0
			함라행진선 도로확포장공사	100,000	23,000	77,000	23
			지방도723호노선지정타당성조사	20,000	17,820	2,180	89.1
		지방도 도로확포장		825,075	250,540	574,535	30.4
			하나로~4산단간 도로확포장공사	825,075	250,540	574,535	30.4	명시 625,076
		철도건널목개량사업		5,246,000	4,964,338	281,662	94.6
			평화육교재가설	5,246,000	4,964,338	281,662	94.6
		교통관리개선사업		986,913	158,559	828,354	16.1
			왕궁신호~용남위험도로 구조개선	401,667	43,624	358,043	10.9	명시 401,667
			낭산~시명 선형개량사업	476,317	8,909	467,408	1.87	명시 76,317
			신왕교차로 회전교차로 설치사업	108,929	106,026	2,903	97.3	명시 108,929
		도로조명시설관리		2,872,268	1,292,072	1,580,196	45.0
			보안등신규설치	307,200	83,588	223,612	27.2
			노후가로등정비	814,000	399,456	414,544	49.1
			가로등보안등 유지관리	1,640,800	796,598	844,202	48.5
			가로등보수차량 운영유지비	17,768	12,430	5,338	70
			보안등신규설치 (보조)	92,500	0	92,500	0
		주민숙원사업		34,600	24,500	10,100	70.8
			주민숙원사업	34,600	24,500	10,100	70.8
	하천정비			22,262,313	5,763,809	16,498,504	25.9
		하천정비및유지관리		22,262,313	5,763,809	16,498,504	25.9
			하천제방유지보수	430,000	75,000	355,000	17.4
			하천제방유지보수(자체)	2,287,130	1,175,229	1,111,901	51.4	명시 436,612
			국가하천유지관리 (4대강)	355,000	318,993	36,007	89.9
			지방하천정비 (왕궁천)	13,810,696	3,576,916	10,233,780	25.9	계속비 10,810,696
			지방하천정비 (동면천)	3,595,632	0	3,595,632	0	계속비 2,595,632
			만경강물문학관 진입도로개설공사	48,245	25,874	22,371	53.6	명시 48,245
			국가하천유지보수(4대강외)	258,000	70,690	187,310	27.4
			소하천정비 (동산천)	1,277,610	499,607	778,003	39.1	명시 370,610
			소하천정비 (진사천)	200,000	21,500	178,500	10.8
	행정운영경비(건설과)			78,242	52,773	25,469	67.5
		인력운영비		45,000	22,051	22,949	49.0
			국가하천유지보수 (인력운영비)	45,000	22,051	22,949	49.0
		기본경비		33,242	30,722	2,520	92.4
			기본경비	33,242	30,722	2,520	92.4

2021 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 평화육교 재가설을 통한 안전성 확보와 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

▸평화육교 개통 : 2021. 6. 22.

◦ 시군도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민 편익 증대

▸신왕교차로 회전교차로 설치사업 준공(회전교차로1식)  : 2021. 1.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장공사 착공               : 2021. 5.

(L=0.80km B=8.0m)

◦ 만경강 환경정비사업 완료	: 2021. 4.

▸축구장, 야구장, 파크골프장, 자전거도로(22km) 등 친수시설 및 주민편의시설

◦ 왕궁천 하천정비를 통한 재해예방 및 영농편의 도모

▸교량 재가설(9개소), 제방축조(좌우 18㎞) 등

▸전체 공정율 : 50% (2021. 6. 기준)

□ 반      성

◦ 지방하천정비사업 지방이양에 따른 동면천 협의지연으로 공사 미 발주

▸행정절차 및 편입토지 협의 보상 병행으로 예산집행 제고 하겠음

2021 주요업무 추진상황

		시･군도 및 농어촌도로 확·포장 군도23호선 도로확·포장 호남고속철도 시설 개량 및 평화육교 재가설 국도27호 서수~평장간 대채우회도로 개설 익산토성 백제왕도 탐방로 조성 지방하천 왕궁천 정비사업 지방하천 동면천 정비사업 동산소하천 정비사업 진사소하천 정비사업 만경강문화관 조성사업 금강 용안생태습지 유지관리 만경강 친수시설 유지관리 하천제방 유지관리 도로조명 조도개선

1		시･군도 및 농어촌도로 확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 30개노선 L=28.43km, B=5.0-24.0m

◦ 총사업비 : 57,197백만원

총사업비	기 투자	2021년	2022년이후	비 고
57,197	24,311	4,565	28,231

□ 상반기 추진실적

◦ 공사 완료 1개소	: 2021. 1.

▸신왕교차로 회전교차로 설치사업

◦ 공사 중 7개소	: 2021. 1. ~ 6.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장 외 6개소

◦ 보상 중 6개소	: 2021. 1. ~ 6.

▸오산면 소재지 진입도로확포장 외 5개소

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 9개소	: 2021. 1. ~ 6.

▸왕궁 신호~용남간 위험도로 구조개선 외 8개소

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 완료 5개소	: 2021. 7. ~ 12.

▸군도23호 도로확포장 외 4개소

◦ 실시설계용역 완료 9개소	: 2021. 7. ~ 12.

▸왕궁 신호~용남간 위험도로 구조개선 외 8개소

◦ 토지매입 추진 18개소	: 2021. 7. ~ 12.

▸삼기 하나로~외화간 도로확포장 외 17개소

시ㆍ군도 및 농어촌도로 사업추진현황 (계속사업)

(단위 : 백만원)

구 분	도로등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	21예산액	금 후
계		30개노선		L=28.43km B=5.0-24m	57,197	24,311	4,565	28,321
준공 (1)	시 도 (1)	68호	석왕동신왕교차로 회전교차로설치	회전교차로 1식	280	280	-	-	준공
공사중 (7)	시 도 (1)	1268호	어양어곳-부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,100	1,250	900	950	5%
	군 도 (1)	23호	군도23호 도로확포장	L=3.40km B=20.5m	12,500	11,500	1,000	-	95%
	농어촌 도 로 (5)	춘포103호 (신화선)	춘포토다리-덕동간 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,920	750	-	1,170	60%
		금마102호 (누부선)	금마누동-신촌간 도로확포장	L=0.93km B=8.0m	980	580	-	400	60%
		황등104호 (황팔선)	황등도선-외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,000	400	-	600	60%
		왕궁207호 (양곡선)	왕궁양동마을 진입도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,310	780	200	330	70%
		금마101호 (서삼선)	금마갈산-서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,829	779	100	1,950	15%
보상중 (10)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730	-	2,450
	군 도 (2)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.95km B=24.0m	5,000	1,100	-	3,900
		21호	왕궁온수~시대간 (황암~상발)확포장	L=3.00km B=8.0m	2,803	616	-	2,187
	농어촌 도 로 (7)	왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동-군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	-	700
		삼기203호 (석라선)	하나로-소간촌간 도로확포장	L=1.58km B=8.0m	1,400	600	-	800
		오산203호 (신수선)	오산역–상아마을간 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	200	200	-	-
		금마202호 (서오선)	금마신정-중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	1,500	600	-	900
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,000	130	-	870
		왕궁303호 (사곡선)	왕궁가좌마을 진입로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,116	103	-	1,013
		왕궁302호 (신평선)	왕궁평화촌~평리간 도로확포장	L=1.30km B=8.0m	3,445	180	-	3,265
실 시 설계중 (9)	군 도 (2)	19호	왕궁신호-용남 위험도로구조개선사업	L=0.50km B=8.0m	486	486	-	-	국비 50%
		9호	낭산-시영간 선형개량사업	L=0.40km B=8.0m	1,000	100	650	250	국비 50%
	농어촌 도 로 (5)	춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	-	1,400
		왕궁210호 (신기선)	왕궁군도26호선 도로확포장	L=1.70km B=8.0m	2,970	797	-	2,173
		춘포311호 (노적선)	춘포 노적선 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	700	100	50	550
		함라301호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,063	900	100	1,063
		오산301호 (용연선)	오산 용연선 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	900	-	100	800
	미지정 (2)		백제왕도탐방로 (익산토성)조성공사	L=1.74km B=5.0m	1,355	70	1,285	-
			황등하동마을- 동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.70km B=8.0m	1,250	650	-	600
기 타 (3)			시,군도 도로관리계획 및농어촌도로기본 정비계획수립용역	1식	320	160	160	-
			서부내륙고속도로 삼기하이패스I.C 타당성조사용역	1식	70	70	-	-
			지방도723호선 노선지정 타당성조사용역	1식	20	-	20	-

2		군도23호선 도로확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍 용왕교차로 ~ 삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사업규모 : L=3.40km, B=20.5m (2차로 → 4차로확장)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

총사업비	기 투자	2021년	2022년 이후	비고
12,500	11,500	1,000	-

□ 상반기 추진실적

◦ 잔여토지 손실보상 및 수용재결	: 2020. 1.~

(대상토지 47필지 7,541㎡)

◦ 공사추진(배수공, 포장공, 부대공, 신호등, 가로등) : 2020. 3. ~ 2021. 6.

▸전체 공정율 95%

□ 하반기 추진계획

◦ 공사준공	: 2021. 7월중

3		호남고속철도 시설개량 및 평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2021. 9.

◦ 사업규모

▸KTX호남고속철도 시설개량 L=864m (2선로 → 4선로 확장)

▸평화육교 재가설 L=365.5m (4차로 → 6차로)

▸접속도로 철거 및 신설 L=770m

▸대체우회도로 (4차로) L=1,068m

◦ 총사업비 : 53,051백만원

구 분	총 사업비	기 투자	2021년도	2022이후
계	53,051	47,805	5,246	-
국가철도공단	30,700	30,700	-	-
익 산 시	22,351	17,105	5,246	-

◦ 시 행 자 : 국가철도공단

◦ 토지보상 : 익   산   시

□ 상반기 추진실적

◦ 평화육교 접속램프 및 교량 재가설	: 2021. 1. ~ 5.

◦ 평화육교 개통	: 2021. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 대체우회도로 철거 및 원상복구	: 2021. 7. ~ 8.

◦ 공사완료	: 2021. 9.

4		국도27호 서수~평장간 대체우회도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km , B= 21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 317,500백만원

※ 동지역(월성,은기,덕기동) 토지보상금 시비 분담 (금액 미정)

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

□ 상반기 추진실적

◦ 장기계속공사 총괄발주 (익산지방국토관리청)	: 2021. 1.

◦ 편입토지 및 지장물조사	: 2021. 2. ~ 5.

◦ 황등지역 집단민원 발생에 따른 관계기관 협의     : 2021. 2. ~ 4

※ 관계기관 : 김수흥국회의원, 익산지방국토관리청, 익산시, 한국전력공사

‣ (1차) 도로선형변경 (만석교차로~신용교차로간)에 따른 총사업비 추가확보(약250억) 및 동지역 토지보상비 익산시 분담 조건 제시  : 2021. 2. 26.

‣ (2차) 도로선형변경 검토비교(안) 중 농지가 대각선 분할되지 않고 탑천과 평행되도록 선형일부 조정요청 : 2021. 3. 23.

‣ (3차) 도로선형변경 검토비교 최적노선 선정 및 설계 용역사의 설계조정 검토후 재협의 결정 :2021. 4. 19.

◦ 공 사 착 공	: 2021. 5.

◦ 편입토지 보상계획열람 공고	: 2021. 5. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 편입토지 감정평가 및 손실보상	: 2021. 7. ~

◦ 1공구 민원구간 노선조정(안)도출 후 최종노선 검토   : 2021.  8. ~ 12.

◦ 2공구 공사추진	: 2021. 7. ~

5		익산토성 백제왕도 탐방로 조성

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 쌍능길 (삼정원 ↔ 미륵사지로까지)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사업규모 : 도로확포장 L=1.74㎞, B=5.0m

◦ 총사업비 : 1,355백만원(공사비 985, 보상비 300, 기타 70)

총 사업비	기 투 자	2021년도	2022년이후	비 고
1,355	70	1,285	-

□ 상반기 추진실적

◦ 산지전용 및 농지전용허가 완료	: 2021.  5.

◦ 실시설계용역 완료	: 2021.  6.

※ 문화재청 현상변경허가 완료 (2020.7.6.)

(허가조건) 노폭 5.0m, 연장 1.74㎞ 중 문화제보호구역 1.16㎞ 황토콘포장

◦ 공사발주 의뢰	: 2021. 6. 21.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사착공	: 2021.  7.

◦ 공사완료	: 2021. 12.

6		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 보석박물관 ~ 춘포면 익산천합류점

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9㎞, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원 (국비 10,093, 도비 23,065, 시비 14,210)

(단위 : ㎞, 백만원)

공구별	총 사업비	기 투 자	2021년도	2022년이후
계	47,368	28,696	3,000	15,672
1지구	23,693	21,693	2,000	0
2지구	23,675	7,003	1,000	15,672

▸2021년 예산액 : 3,000백만원 (도비 2,100 시비 900)

□ 상반기 추진실적

◦ 왕궁천(1지구) 공사추진(3차분 공사중)	: 2021.  1.  ~ 6.

▸발산2교, 평리교, 흥암1교 교량 설치 완료

▸발산교, 흥암교 교량 설치 중(공정율 50%)

▸전체 공정율(1지구) : 50%

◦ 왕궁천(2지구) 공사추진(1차분 공사중)	: 2021.  1.  ~  6.

▸자연석쌓기 완료(보석박물관 앞)

▸장중교, 광암2교 설치 중(공정율 70%)

▸호안블록 설치 중(공정율 20%)

▸전체 공정율(2지구) : 30%

□ 하반기 추진계획

◦ 왕궁천 1, 2지구 공사 추진	: 2021.  7. ~ 12.

▸2지구 1차분 준공	: 2021.  8.

◦ 하천정비공사 추진	: 2022년 완공예정

7		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 평장리 부상천 합류점

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=6.10㎞, 노후교량 재가설 7개소 등

◦ 총사업비 : 15,489백만원 (국비 1,000, 도비 9,842, 시비 4,647)

총 사업비	기 투 자	2021년도	2022년이후	비 고
15,489	2,440	1,000	12,049

▸2021년 예산액 : 1,000백만원 (도비 700 시비 300)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 협의(2차, 전라북도)	: 2021.  3.  17.

※ 지방하천사업 지방이양(국토부 → 전라북도)	: 2020.  1.

◦ 편입토지 보상계획 공고	: 2021.  5.  11.

□ 하반기 추진계획

◦ 편입토지 협의보상	: 2021.  7. ~ 12.

◦ 건설기술심의	및 총사업비 협의(전라북도)	: 2021.  7. ~  8.

◦ 건설사업관리용역 발주	: 2021.  7. ~  8.

◦ 장기계속공사 총괄 발주	: 2021. 9월중

8		동산소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 웅포면 맹산리 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 8.

◦ 사업규모 : 소하천정비 L=1.02km

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=1.02km, 노후교량 재가설 6개소 등

◦ 총사업비 : 3,210백만원(국비 353, 시비 2,857)

▸2021년 예산액 : 907백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 동산천(3차분) 착수	: 2021.  4.  5.

▸교량 재가설(6개소)/ 호안(자연석쌓기) 완료

▸제방 보축 공사 중(공정율 : 70%)

▸전체 공정율 : 95%(2021. 6. 기준)

□ 하반기 추진계획

◦ 동산천 준공	: 2021.  8.

9		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 소하천정비 L=1.37km

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=1.37km, 노후교량 재가설 5개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원

▸2021년 예산액 : 200백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: 2021.  4.  13.

▸전체 공정율 : 35%

◦ 토질조사용역 착수	: 2021.  4.  15.

□ 하반기 추진계획

◦ 진사천 주민설명회	: 2021.   9.

◦ 사전설계검토(전라북도)	: 2021.  11.

◦ 편입토지 분할측량	: 2021.  12.

10		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지(13,814㎡)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 11,350백만원(국비 10,000 시비 1,350)

◦ 규    모 : 13,814㎡(지하 1층, 지상 2층 / 연면적 1,686㎡)

◦ 주요시설 : 생태전시 및 홍보관, 다목적실, 사무실, 카페테리아, 등

◦ 시  행  자 : 익산지방국토관리청

◦ 편입토지 손실보상 : 익산시

□ 상반기 추진실적

◦ 건축 및 토목공사 등 추진 (익산지방국토관리청)    : 2021. 1. ~ 6.

▸6월말 기준 전체공정 50% (내부 및 외부 마감공사) 공사중

◦ 전시물 설계・제작・설치를 위한 콘텐츠 용역 완료(익산지방국토관리청)

: 2021. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 건축 및 토목공사 등 완료(익산지방국토관리청)     : 2021. 12.

◦ 전시물 설계·제작·설치 완료(익산지방국토관리청)   : 2021. 12.

◦ 만경강문화관 관리·운영(익산시)	: 2022. 1월중

11		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 전망데크 제방연결로포장, 주차장 등 편의시설 정비,
노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 845백만원 (국비 400 시비 445)

(단위 : 백만원)

재원별	세 부 사 업 내 용	2021예산액
	계	845
국 비	홍련지 데크및 연못 수련 보수, 창포 초화류	271
	하천 환경정비 기간제(감시원), 공공운영비	129
시 비	제방 연결도로, 광장 주차진입로, 안내표지판 등	250
	산책로 데크 및 황토포장 보수, 제초・예초	195

□ 상반기 추진실적

◦ 보강시설물 실시설계용역 완료                    : 2021. 4. 4.

◦ 대전지방국토관리청 하천점용허가 완료       : 2021. 2. 5. ~ 4. 1.

▸용안생태습지 전망데크 연결도로 포장, 광장진입도로 포장

◦ 관광활성화를 위한 조경시설 보강 추진(535백만원)   : 2021. 3. ~ 6.

▸완료 : 용안생태습지 산책로 풀깎기, 홍련지 진입부데크 재정비

▸추진중 : 전망데크 제방 연결로 포장, 광장진입로 포장, 산책로 황토포장보수

◦ 금강 용안생태하천 환경정비 추진(265백만원)      : 2021.  3. ~  11.

▸하천환경정비 기간제 근로자 30명

▸다년생 및 계절꽃 초화류식재, 제초 및 예초작업 등

□ 하반기 추진계획

◦ 관광활성화를 위한 조경시설 보강 완료            : 2021. 10.

◦ 금강 용안생태하천 환경정비                      : 2021. 3. ~  11.

12		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강(L=28km) 6개 하천환경정비사업지구

구 분	준 공	주 요 시 설	비 고
신 지	2016	자전거도로 5.42km, 친수공간 등
목 천	2016	자전거도로 2.32km, 파크골프장 등
춘 포	2016	자전거도로 4.0km, 축구장, 수변공원 등
화 전	2018	자전거도로 1.3km, 구담교, 친수공간 등
반 월	2021	자전거 2.8km, 축구,야구,족구,농구장,인라인 등
마 산	2021	자전거도로 5.87km, 친수공간 등

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사업비 : 338백만원(국비 258, 시비 80)

◦ 주요내용 : 친수시설관리, 자전거도로 제초, 예초, 시설물보수 등

□ 상반기 추진실적

◦ 보강시설물 실시설계용역 완료                     : 2021. 5. 17.

◦ 관광활성화를 위한 친수시설 기능보강(318백만원)         : 2021. 3. ~ 6.

▸완료 : 반월지구 화장실 정비, 제방 및 자전거도로 미끄럼방지포장, 제방변 벤치교체공사, 목천지구 파크골프장(9홀) 조성공사, 제방 및 자전거도로 풀깎기

▸추진중 : 정화조(3개소) 설치

◦ 만경강 하천환경정비 추진(20백만원)                 : 2021. 3. ~ 11.

▸기간제 근로자 2명 쓰레기 줍기, 예초, 제초, 화장실 등 청소

□ 하반기 추진계획

◦ 관광활성화를 위한 친수시설 기능보강 완료          : 2021. 8.

◦ 만경강 하천환경정비                                : 2021. 3. ~  11.

13		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 지방하천 27개소(L=187.2km), 소하천 62개소(L=102.2km)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 집중호우대비 시설물보수, 하상준설, 지장물제거, 제방 및

호안 제초, 예초 등

◦ 총사업비 : 1,689백만원(도비 350, 시비 1,339)

□ 상반기 추진실적

◦ 지방 및 소하천 유지관리사업 추진

구분	단위사업별	사업비	주 요 내 용	실 적
수해복구	왕궁 쌍제천 하천준설	50	퇴적토준설	공사중
	금마 황동천 제방보수	32	제방보수	완 료
	삼기 기양천 석축보수	50	호안 석축보수	완 료
	팔봉 갈전천 석축보수	70	호안 석축보수	공사중
	낭산 죽림천 죽림1교 보수	120	소교량 재가설	완 료
	탑천 하상준설	300	퇴적토준설	공사중
	죽청천, 부상천 등 유지보수	430	퇴적토준설, 잡목제거 등	공사중
지방·소하천 유지관리		500	20년 응급복구 및 21년 호우피해 대비 등	연 중
산북천 제방도로 포장		131	제방포장	완 료
탑천 제초작업		6	재방도로 제초	공사중

□ 하반기 추진계획

◦ 지방 및 소하천 유지관리                                 : 연 중

14		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 생활환경개선 보안등 설치 외 11개사업

◦ 총사업비 : 1,116백만원

(단위 : 백만원)

구 분	단위사업명	주 요 내 용	2021예산액
	계	13개 사업	1,116
가로등	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비120개소	120
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 60개소	60
	가로등 노후점멸기 교체	노후점멸기교체 5개소	22
	전기안전점검 부적합지 보수	점검부적합보수 300개소	30
	도심지역 노후가로등 교체	노후가로등정비 1식	100
	노후가로등 LED 교체	LED등기구교체 1식	100
	산업단지 조도개선	램프(안정기)교체 1식	80
	별빛달빛 프로젝트 사업	가로등보안등 정비 1식	57
보안등	생활환경개선 보안등 신규설치	보안등설치 283개소	305
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	120
	동지역 보안등 보수	동지역 고장보안등 수리	80
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	42

□ 상반기 추진실적

◦ 보안등 신규설치사업 추진(102백만원 집행)	: 2021. 1. ~ 6.

▸관내 보안등 102개소 신규설치

◦ 노후가로등 정비사업 추진(447백만원 집행)	: 2021. 1. ~ 6.

▸분전함 5개소 교체, LED가로등기구 263개소 교체, 기타 가로(보안)등 보수 및 정비 등

□ 하반기 추진계획

◦ 보안등 신규설치 잔여사업 추진	: 2021.  7 .~ 12.

◦ 노후가로등 정비 잔여사업 추진	: 2021.  7. ~ 12.