2021.  7.

제236회 익산시의회(임시회)

― 2021 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 예산집행실적
□	2021 상반기 성과 및 반성
□	2021 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 ‘多e로움 water’공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	안전하고 깨끗한 물, 365일 안정적인 생산․공급 방안강구 유수율 향상을 통한 공기업 재정 건전성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 스마트 미터 사업을 통한 유수율 제고 및 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	7	15	10	6	2
현 원	44	1	1	13	19	4	4	2
증 감	2			6	4	△6	△2

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원					임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시 민 단 체	기관
10	2	1	2	4	1	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	280,152	278,471	99.4
도심권	222,148	221,917	99.9
읍면권	58,004	56,554	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	생 산 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	147,353
생 활 용 수	소 계	195,300	126,097	100%
	광 역	105,300	65,359	52%
	자 체	90,000	60,738	48%
공 업 용 수	자 체	35,000	21,256

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,157	3,255,194	100
가 정 용	48,680	1,649,352	50.8
일 반 용	14,630	532,297	16.3
대 중 탕 용	40	13,800	0.4
산 업 용	710	394,106	12.1
전용공업용	97	665,639	20.4

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,899.8	2.5	25.3	1,185.9	686.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2021 예산집행실적

【 2021. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	관	항	세항	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				54,335,560	17,973,438	36,362,122	33.1
	사업비용			23,753,515	9,935,294	13,818,221	41.8
		영업비용		23,703,515	9,935,294	13,768,221	41.9
			원수 및 취수비	13,217,399	5,558,132	7,659,267	42.1
			정수비	2,425,677	778,093	1,647,584	32.1
			배·급수비	289,322	131,869	157,453	45.6
			급배수공사비	1,286,048	687,069	598,979	53.4
			일반관리비	4,958,180	2,186,112	2,772,068	44.1
			징수 및 수용가관리비	1,526,889	594,019	932,870	38.9
		예 비 비		50,000	0	50,000	0.00
	자본적지출			30,582,045	8,038,144	22,543,901	26.3
		유형자산취득		16,372,736	2,295,144	14,077,592	14.0
			구축물	4,028,351	1,734,049	2,294,302	43.0	건설개량 207,069천원 사고이월 71,934천원
			기계장치	12,254,385	475,975	11,778,410	3.9	건설개량 4,073,000천원
			차량운반구	25,000	21,370	3,630	85.5
			공기구비품	65,000	63,750	1,250	98.1
		비가동설비자산취득		14,064,734	5,743,000	8,321,734	40.8
		예비비		144,575	0	144,575	0.0

2021 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

‣ 노후상수도 정비사업 : 실시설계용역 추진(공정률 50%, 블록고립 확인 10개소)

‣ 스마트 지방상수도 지원사업 : 기본계획에 따른 단계별 추진방법 확정

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 3개소 0.8km/296개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 : 50개소

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

‣ ‘21년 부과/징수 : 10,826백만원/10,637백만원(징수율 98.3%)

‣ 체납 징수반 편성·운영, 체납독려 및 단수조치, 징수 책임제 시행      ◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 : 2개소 1.32km / 급 □ 배수관 개선공사 : 253개소 4.3km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 882건, 수용가 옥내누수 탐사 587건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 21개소 5.6km

□ 반      성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 코로나 19 확산으로 상수도 요금 현실화 추진 유보

‣ 연도별 현실화율 현황(2018년 75.05%, 2019년 72.40% 2020년 71.41%)

2021 주요업무 추진상황

		지방상수도현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축> 스마트미터 사업 추진 금마배수지 확충 공사 급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사 상수도 요금․부과 징수 정수시설물 운영 최적화 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사 업 비 : 58,725백만원

▸노후상수도 정비사업 : 55,733백만원(국 50%, 도 10%, 시 40%)

- 2021년 사업비 : 12,080백만원(국 6,040  도 1,208  시 4,832)

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 2,992백만원(국 70%, 시 30%)

◦ 사업내용

▸노후관교체(L=148km) 및 블록시스템구축(61개소)

▸정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 유량수압 감시 시스템 등

□ 상반기 추진실적

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역(공정률 : 50%)	: 2020. 1. ~ 2021. 6.

▸블록시스템 구축공사 추진	: 2021. 1. ~ 2021. 6.

- 블록구축을 위한 블록고립 확인(61개 블록 중 10개소 확인)

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸단계별 물품 구입 및 공사 발주 방식 검토·확정	: 2021. 1. ~ 2021. 6.

- 1단계(스마트관로인식체계, 워터코디․닥터)

- 2단계(정밀여과장치, 자동수질 측정장치)

- 3단계(재염소설비,정밀여과장치,관세척 등)

□ 하반기 추진계획

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역	: 2021. 7. ~ 2022.  8.

▸블록시스템 구축공사 추진	: 2021. 7. ~ 2021. 12.

- 블록고립 확인(51개소) 및 우선사업대상지 공사 발주

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸단계별 물품 구입 및 공사 발주 및 추진	: 2021. 7. ~ 2021. 12.

2		스마트미터 사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 12,100백만원(국 8,740, 시 3,630)

◦ 사 업 량 : 38,600전(13~25mm 소구경)

◦ 사업내용

▸디지털 수도미터구입 및 설치공사, 원격검침단말기 설치, 통신망 관리  서버 및 소프트웨어 구축 등

□ 상반기 추진실적

◦ 스마트미터 추진에 따른 기초자료 조사	: 2021. 3.

▸계량기 및 원격검침시스템 자료 조사, 설치 장소 협의 등

◦ 디지털 수도미터(계량기) 구입	: 2021. 6.

▸6차 분할구입 : 38,600전/2,710백만원

◦ 디지털 수도미터(계량기) 설치공사	: 2021. 6.

▸13구역 분할 설치공사 추진 : 38,600전/22개 면·동지역

◦ 상수도 원격검침 서버 및 소프트웨어 구입	: 2021. 6.

◦ 7개 면·동 이장회의 등 시민 홍보	: 2021. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 계량기 설치공사 준공	: 2021. 8.

◦ 무선 검침단말기 설치공사 발주 및 준공	: 2021. 7. ~ 12.

◦ 대시민 홍보(설명회, 보도자료 등)	: 2021. 7. ~ 12.

◦ 스마트미터 사업 시범운영	: 2021. 12.

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 산33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.(3개년)

◦ 사 업 비 : 8,010백만원(균특 5,900백만원, 시비 2,110백만원)

▸2021년 사업비 : 714백만원(도비 500, 시비 214백만원)

◦ 사업내용 : 배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

▸2021년 사업내용 : 실시계획승인, 배수지 토공 및 기초공사

□ 상반기 추진실적

◦ 금마배수지 확충공사 실시계획인가용역 발주	: 2021. 2.

◦ 금마배수지 확충공사 도시계획시설(수도공급설비)사업 실시계획인가	: 2021. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 금마배수지 확충공사 설계심의	: 2021. 7.

◦ 금마배수지 확충공사 원가심사	: 2021. 8.

◦ 수도사업인가(전라북도)	: 2021. 9.

◦ 금마배수지 확충공사 발주	: 2021. 9.

◦ 금마배수지 확충공사 준공	: 2023. 11.

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 2021. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,608
급수구역 확장공사	송학교차로 일원	배수관부설 L=700m	147
	오산면사무소 앞	배수관부설 L=730m	153
	여산면 신부마을	배수관부설 L=590m	124
	읍□면□동 급수관로 신설	5개소	34
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	28개소, 7.0km	500
급·배수관 개선공사	익산시 일원	6.0km	650

□ 상반기 추진실적

◦ 급수구역 확장·노면정비·급수민원 개선 설계 및 공사추진	: 2021. 2.~ 4.

◦ 월성동 312-15번지 외 20개소 노면정비공사 준공(5.6km)	: 2021. 6.

◦ 군익로 426-50 외 252개소 급·배수관 개선공사 준공(4.3km)	: 2021. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 여산면 신부마을 외 2개소 급수구역 확장공사 준공	: 2021. 7.

◦ 오산면사무소 외 2개소 급수구역 확장공사 준공	: 2021. 8.

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사 추진(7개소, 1.4km)	: 2021. 11.

◦ 하반기 급·배수관 개선공사 추진(1.7km)	: 연중

5		상수도 요금 부과·징수

□ 사 업 개 요

◦ 2021년도 요금 부과 징수 목표액

(‘21. 6. 16.현재 / 단위:백만원, %)

구분	‘21년도 목표액	부과액		징수액(징수율)		비고
		현년도	과년도	현년도	과년도
금액	26,925	10,826	865	10,637 (98.3%)	209 (24.2%)	과년도체납액 중 59백만원 결손처분 (2021. 6. 15.)

□ 상반기 추진실적

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육 : 6회

▸ 계량기 조사원 담당구역 징수 책임제 시행  : 2회이상 체납자 독려, 단수예고문 부착

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수추진반 편성․운영 : 2개반 11명

▸ 전화, 문자, 방문 체납독려 및 단수조치 : 납부독려 6,040건 / 단수 266건

▸ 30만원 이상, 3회 이상 고액 체납자 압류예고문 발송 및 압류 : 309건 / 10건

▸ 30만원 미만, 3회이상 체납자 단수예고문 발송 : 5,924건

▸ 상수도사용료 체납자 독려 결과보고(월2회)

▸ 소멸시효 완성에 따른 상하수도요금 체납액 결손처분 : 351건/59백만원

◦ 수도요금 고지 관리

▸ 요금고지 : 월 59,537건 (우편발송 1,935건/ 조사원 전달 56,673건 /스마트고지 929) ※ 자동납부 28,633건

□ 하반기 추진계획

◦ 수도 계량기 조사원 친절․직무 교육 및 워크숍 실시 : 교육(월1회) / 워크숍(12월중)

◦ 징수율 제고를 위한 체납징수 활동 강화

▸ 상습체납자 집중 징수기간 운영 및 행정조치 : 단수, 토지 및 건물 등 재산압류

※  기초생활수급자 등 사회적 약자 단수유예로 시민불편 최소화

6		정수시설물 운영 최적화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사업대상 : 11개소(정수장2, 배수지7, 가압장2)

◦ 사업내용

▸ 정수시설물(침전지, 배수지) 청소로 정수처리 효율증가 및 맑은 물 공급

▸ 노후시설물의 보수 및 교체공사로 안정적인 정수생산

□ 상반기 추진실적

◦ 배수지 청소 1회, 침전지 청소 2회 완료	: 2021. 3. ~ 6.

◦ 신흥정수장 여과지 여과사 교체공사(상반기) 완료	: 2021. 4. 21.

◦ 정수시설물 전기설비 유지보수

▸ 정류기 및 UPS 축전지 구매 설치	: 2021. 2. 8.

▸ 신흥정수장 수전설비 VCB 교체공사 완료	: 2021. 5. 6.

◦ 정수시설 정밀안전진단 및 기술진단 보수사업

▸ 약품투입동 MCC반 보수공사 완료	: 2021. 3. 11.

▸ 신흥 및 금강정수장 압력전송기 설치공사 완료	: 2021. 5. 6.

▸ 정수장 침전지 및 여과지 보수공사 완료	: 2021. 6. 25.

◦ 신흥정수장 침전지 퇴수밸브 교체공사 완료	: 2021. 6. 25.

◦ 정수시설물 정밀점검 용역 착수	: 2021. 3. ~ 8.

◦ 왕궁배수지 사면 정비공사 착공	: 2021. 5. ~ 8.

□ 하반기 추진계획

◦ 정수시설물 청소 및 여과사 교체공사

▸ 침전지 청소(3차, 4차)	: 2021. 8. / 11.

▸ 배수지 청소(하반기)	: 2021. 11.

▸ 신흥정수장 여과지 여과사 교체공사(하반기)	: 2021. 9. ~ 11.

7		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 확보를 위한 주민 홍보 강화

□ 상반기 추진실적

◦ 원․정수 수질 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정 수질검사 기준	자체 수질검사 실시
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 26개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 26개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시 : 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 실시	: 2021. 3. 12.

▸상수원 보호구역 현장실사 2차 실시(2021. 3월, 6월)

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부(50,000부)	: 2021. 5.

◦ 수질검사결과 홍보강화 : 공공기관, 홈페이지 및 내고장소식지 등

◦ 상수원 수로 관리 강화

▸한국농어촌공사와 합동 수로 관리 및 지점별 수질검사 실시

□ 하반기 추진계획

◦ 수돗물 안심제 상시 운영 : 인터넷 등으로 신청 수질검사 후 결과 통보

◦ 수돗물 평가위원회 개최	: 2021. 11.

▸수돗물 수질관리 및 수도시설 운영 전반에 대한 자문 및 의견 수렴