2021.  7.

제236회 익산시의회(임시회)

― 2021 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 예산집행실적
□	2021 상반기 성과 및 반성
□	2021 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	-	1	6	6	7	5
현 원	25	-	1	7	7	2	8
증 감				1	1	▵5	3

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 사  무  분  장

2021 예산집행실적

【 2021. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	관	항	세항	예산액(A)	집행액(B)	잔 액	비 율 (B/A)	비고
하수도과				79,101,242	40,563,152	38,538,090	51.3
	사업비용			32,997,876	26,840,595	6,157,281	81.3
		영업비용		32,847,876	26,840,595	6,007,281	81.7
			관거비	14,858,082	10,821,563	4,036,519	72.8
			처리장비	15,241,168	14,910,162	331,006	97.8
			일반관리비	2,748,626	1,108,870	1,639,756	40.3
		예비비		150,000	0	150,000	0.0
	자본적지출			46,103,366	13,722,557	32,380,809	29.8
		유형자산취득		42,290,061	13,483,043	28,807,018	31.9
			구축물	42,051,792	13,438,043	28,613,749	32.0
			건설중인자산	100,000	10,763	89,237	10.8
			공기구비품	138,269	34,237	104,032	24.8
		비가동설비자산취득		1,948,290	81,400	1,866,890	4.2
			건설중인자산	1,948,290	81,400	1,866,890	4.2
		기타자본적지출		1,515,015	158,114	1,356,901	10.4
			정부보조금반환	1,515,015	158,114	1,356,901	10.4
		예비비		350,000	0	350,000	0.0

2021 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2021년 하수관로 정비사업 국고보조 신규 사업 확정

‣ 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국비 6,054백만원 확보

‣ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계) 국비 397백만원 확보

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 남부2·3,북부2처리분구 하수관로 정비공사 추진(공정율 59%)

- 관로정비 24.8km, 배수설비 1,522개소

‣ 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비공사 사업발주

‣ 북부1처리분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 추진(공정율 89%)

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣ 익산공공하수처리시설 차집관로 및 소규모하수(3개소) 기술진단 실시

‣ 익산공공하수 3중계펌프장 탈취기 개선을 통한 악취 저감 추진

‣ 제3산단 폐수처리장 외 6개소 기능보강공사 추진으로 운전효율 증대

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 소규모 공사 131건 및 맨홀 단차 보수공사 85개소 처리

‣ 시내일원 침수우려지역 12개소 등 하수도기계준설공사 추진 중(10건)

‣ 생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영(1,280건)

□ 반      성

◦ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 행정절차(환경부 재원협의) 지연으로 공사 미착공

2021 주요업무 추진상황

		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비공사 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 하수찌꺼기 감량화 사업 공공하수처리시설 운영관리(BTO) 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

1		남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2019. 05. ~ 2022. 05.

◦ 사업내용 : 오수관로정비 L=30.5km, 배수설비 2,616가구

◦ 총사업비 : 36,490백만원 (국비 25,543 도비 1,094 시비 9,853)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022 이후	비고
합계(100%)	36,490	14,843	1,447	9,496	10,704
국비( 70%)	25,543	9,830	1,013	6,647	8,053
도비( 3%)	1,094	420	43	285	346
시비( 27%)	9,853	4,593	391	2,564	2,305

□ 상반기 추진실적

◦ 시설공사 3차분 착공(공정율 51%)	: 2021. 01. 12.

▸오수관로 정비 L=3.0km, 배수설비 583가구

※ 전체 공정율: 59% (관로 24.8km, 배수설비 1,522가구)

□ 하반기 추진계획

◦ 시설공사 3차분 완공	: 2021. 11.

▸신용동, 동산동, 영등1동 일원

2		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구 등

◦ 총사업비 : 37,386백만원 (국비 13,559 도비 2,382 시비 21,445)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019	2020	2021	2022이후	비고
합계(100%)	37,386	1,000	321	2,732	33,333
국비( 36%)	13,559	500	142	1,366	11,551
도비( 6%)	2,382	50	14	136	2,182
시비( 58%)	21,445	450	165	1,230	19,600

□ 상반기 추진실적

◦ 설계안전성검토 용역 착수	: 2021. 03. 22.

◦ 계약심의위원회 완료	: 2021. 03. 24.

◦ 건설사업관리용역 계약의뢰(조달청)	: 2021. 04. 08.

◦ 재원협의 완료(환경부)	: 2021. 05. 13.

▸총사업비 증액: 180억 ⇒ 373억(증 193억원)

▸사업기간 1년 연장 : 2019년 ~ 2023년 ⇒  2019년 ~ 2024년

◦ 시설공사 계약의뢰(조달청)	: 2021. 06. 08.

□ 하반기 추진계획

◦ 설계안전성검토 용역 준공	: 2021. 07.

◦ 공사 착공	: 2021. 08.

3		북부1 처리분구 하수관로 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=35.6km, 배수설비 2,648가구

◦ 총사업비 : 41,607백만원 (국비 29,125 도비 1,248 시비 11,234)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	41,607	714	6,209	12,482	12,482	9,720
국비( 70%)	29,125	500	4,346	8,737	8,737	6,805
도비( 3%)	1,248	21	186	374	374	293
시비( 27%)	11,234	193	1,677	3,371	3,371	2,622

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역(2차분) 착수	: 2021. 02. 01.

◦ 시설공사 발주 전 행정절차 이행

▸설계 경제성검토(VE) 용역 계약 의뢰	: 2021. 06. 24.

▸설계 안전성검토 용역 계약 의뢰	: 2021. 06. 25.

□ 하반기 추진계획

◦ 시설공사 발주 전 행정절차

▸보수공법 선정위원회	: 2021. 07.

▸지방건설기술심의회	: 2021. 07.

▸환경부 재원협의	: 2021. 09.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 발주	: 2021. 10.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 착공	: 2021. 11.

4		하수찌꺼기 감량화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 10.

◦ 사업내용

▸소화조 개량(10,000㎥) 및 신설(6,692㎥) : 교반기 신설, 가온방식 변경

▸탈취시설, 기계식 농축시설, 가스 저장 및 정제설비, 저류조 등 신설

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비 18,791 도비 4,027 시비 3,285 기금 741)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	비고
합계(100%)	26,844	3,688	13,293	9,863
국비( 70%)	18,791	2,372	9,305	7,114
도비( 15%)	4,027	509	1,994	1,524
시비( 15%)	4,026	807	1,994	1,225

□ 상반기 추진실적

◦ 시설공사(3차분) 착공	: 2021. 02. 25.

◦ 건설사업관리용역(3차분) 착공	: 2021. 02. 26.

◦ 전기계측공사(3차분) 준공	: 2021. 04. 30.

◦ 전기계측공사(4차분) 및 전기소방공사(2차분) 착공	: 2021. 06. 23.

□ 하반기 추진계획

◦ 시설공사(2차분) 준공	: 2021. 10. 29.

◦ 건설사업관리용역(3차분) 준공	: 2021. 11. 28.

5		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 사 업 개 요

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소(익산공공 외 4개소)

시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

※ 2021년 BTO위탁운영비 : 11,856백만원(도비 590 시비 11,266)

□ 상반기 추진실적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개 항목)

▸익산 외 3개소(일 1회), 수질 TMS 유지관리(5개 항목)

◦ 익산공공 외 3개 하수처리시설 1, 2분기 복합악취농도 기준 준수(부지경계 등)

◦ 익산공공하수 차집관로 기술진단 착수	: 2021. 02.

◦ 익산북부공공하수 유입펌프 인버터 설치공사 착공	: 2021. 04.

◦ 익산공공하수 3중계펌프장 탈취기 개선공사 착공	: 2021. 05.

◦ 익산공공하수 총인처리시설 여과기 여재 교체 공사 착공	: 2021. 06.

□ 하반기 추진계획

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 3, 4분기 시행	: 2021. 07. ~ 12.

◦ 익산공공하수 차집관로 기술진단 완료	: 2021. 10.

◦ 공공하·폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 착수	: 2021. 10.

◦ 공공하수도 운영관리 실태평가(환경청)	: 2021. 06. ~ 11.

6		공공하⦁폐수처리시설 관리대행

□ 사 업 개 요

◦ 위탁업체 : 환경시설관리(주) 51% / (유)대신환경개발 49%

◦ 위탁기간 : 2020. 01. 01. ~ 2022. 08. 31.(2년 8개월)

◦ 총 위탁(협약)금액 : 7,530백만원(시비)

◦ 과업대상 : 폐수처리장 2, 하수처리장 23, 중계펌프 89, 초기우수 2

□ 상반기 추진실적

◦ 국가식품클러스터 폐수처리장 TOC측정기기 설치 완료	: 2021. 04.

◦ 삼기간촌 하수처리시설 수중믹서 설치 완료	: 2021. 04.

◦ 국가식품클러스터 폐수처리장 공기압축기 교체 완료	: 2021. 05.

◦ 제3산단 폐수처리장 탈수기 보수 완료	: 2021. 05.

◦ 국가식품클러스터 폐수처리장 분리막 세정 완료	: 2021. 06.

◦ 하·폐수처리시설 점검(주5회) 및 수질검사 완료	: 2021. 01. ~ 06.

수질검사주기	일 1회	주 1회	월 1회
검사대상	500톤/일 이상	50~500톤/일	50톤/일 미만
개소수	3개소	12개소	10개소

□ 하반기 추진계획

◦ 하·폐수처리시설 수시점검(주5회) 및 수질검사 시행	: 2021. 07. ~ 12.

◦ 제3산단 폐수처리장 외 9개소 유량계 검교정용역 완료	: 2021. 08.

◦ 제3산단 폐수처리장 분리막 흡인펌프 설치 완료	: 2021. 11.

7		노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 모현동, 송학동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.61km

◦ 총사업비 : 12,109백만원(국비 6,055 도비 605 시비 5,449)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	비고
합계(100%)	12,109	220	1,000	10,889
국비( 50%)	6,055		500	5,555
도비( 5%)	605		50	555
시비( 45%)	5,449	220	450	4,779

□ 상반기 추진실적

◦ 노후우수박스 현장 육안조사 완료	: 2021. 03.

◦ 사업 구역 지장물 조사 완료	: 2021. 05.

◦ 노후우수박스 보수방법 검토	: 2021. 06.

□ 하반기 추진계획

◦ 비굴착전체보수 공법 선정	: 2021. 08.

◦ 설계경제성(VE)검토 용역 시행	: 2021. 09.

◦ 익산시 기술자문위원회 개최	: 2021. 10.

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2021. 11.

◦ 공사 착수	: 2021. 12.

8		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=21.4km

◦ 총사업비 : 15,080백만원(국비 7,540 도비 754 시비 6,786)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022 이후	비고
합계(100%)	15,080	186	1,000	2,000	11,894
국비( 50%)	7,540	0	500	1,000	6,040
도비( 5%)	754	0	50	100	604
시비( 45%)	6,786	186	450	900	5,250

□ 상반기 추진실적

◦ 환경부 재원협의 보완 자료 제출	: 2021. 01. ~ 04.

▸하수관로 노후상태 증빙자료 제출

◦ 재원협의에 따른 업무 협의(전북지방환경청)	: 2021. 05.

▸노후하수관로 보수방식에 대한 의견 조율

◦ 재원협의 보완에 따른 하수관로 CCTV 조사 시행	: 2021. 06.

□ 하반기 추진계획

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2021. 09.

◦ 전라북도 원가심사 완료	: 2021. 11.

◦ 공사 착수	: 2021. 12.

9		소규모 하수도시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 2,074백만원(시비)

◦ 사업내용

▸소규모 하수도시설 정비공사	: 44건 / 1,185백만원      ▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 21건 /   144백만원

- 함열읍 중촌마을 하수도 정비공사 외 20건

▸하수관로 기계준설	: 20건 /   745백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 소규모 하수도시설 정비공사	: 26건 /  700백만원

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 15건 /  100백만원

◦ 하수관로 기계준설	: 13건 /  461백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 소규모 하수도시설 정비공사	: 18건 /  485백만원

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	:  6건 /   44백만원

◦ 하수관로 기계준설	:  7건 /  284백만원