2021. 10. 18.

제238회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 결산보고

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 예산집행실적
□	2021 주요성과
□	2021 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	21		1	4	9	4	3
현 원	22		1	7	9	3	2
증 감	1		-	3	-	△1	△1

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진, 철도건널목 개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	하천유지관리(국가,지방,소하천),용안생태습지유지관리 하천사용료 징수 부과, 골재채취허가
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	154.779	168.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	28.169	74.034	27%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
473	404	-	69	2,679,282	224,739	-	2,454,543

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,025	19,632	10,393

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2021 예산집행실적

【 2021. 9. 30. 현재 】 (단위 : 천원, %)
부서	정책	단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과					45,756,741	23,773,687	21,983,054	52.0	명시 3,083,118 사고 5,516,727 계속비 13,406,328
	도로시설관리				21,968,766	14,506,601	7,462,165	66.0
		시군농어촌도로확포장공사			11,005,209	6,438,821	4,566,388	58.5
				금마 갈산-서편간 도로확포장공사	463,834	410,410	53,424	88.5	명시 200,000 사고 163,834
				왕궁 군도26호선(리도210호) 도로확포장	53,948	0	53,948	0	사고 53,948
				미불용지매입비(시군도농어촌도로)	100,000	29,700	70,300	29.7
				춘포 토다리-덕동간 도로확포장공사	376,050	279,869	96,181	74.4	사고 376,050
				금마 누동~신촌간 도로확포장	180,000	53,124	126,876	29.5	사고 180,000
				군도 23호선 도로 확포장공사	3,160,153	2,863,199	296,954	90.6	사고 2,160,153
				시군도 도로관리계획및 농어촌도로 기본계획 용역	258,201	82,087	176,114	31.8	사고 98,201
				어양동 어곳~부평간 도로확포장	958,472	329,461	629,011	34.4	명시 58,472
				오산면 소재지 진입도로(군도2호) 확포장공사	1,000,000	874,889	125,111	87.5	명시 500,000 사고 500,000
				황등 도선-외화간 도로(면도104호)확포장공사	268,192	212,223	55,969	79.1	사고 268,192
				오산역-상아마을간(리도203호)병목구간 도로확포장공사	154,424	76,495	77,929	49.5	사고 154,424
				하나로~소간촌간 도로(리도203호)확포장공사	497,670	374,268	123,402	75.2	사고 497,670
				왕궁 양동마을 진입도로(리도207호)확포장공사	300,962	248,321	52,641	82.5	명시 17,190 사고 83,772
				춘포 창평마을 진입도로(농도308호)확포장공사	30,077	0	30,077	0	사고 30,077
				왕궁 금오동-군도22호간 도로(면도102호) 확포장공사	244,556	127,530	117,026	52.1	사고 244,556
				금마 신정-중왕간 도로(리도202호) 확포장공사	198,198	130,147	68,051	65.7	사고 198,198
				춘포 오룡선 도로확포장	7,652	1,069	6,583	14.0	사고 7,652
				황등면 하동마을~동연지하차도 우회도로 개설공사	500,000	0	500,000	0	사고 500,000
				춘포 노적선 도로확포장공사	600,000	26,270	573,730	4.4	명시 100,000
				시군농어촌도로 확포장사업 추진(시설부대비)	10,000	5,720	4,280	57.2
				시도31호 도로확포장 사업 (서부내륙고속도로 삼기하이패스 IC설치 타당성 조사)	70,000	0	70,000	0	명시 70,000
				백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	1,355,000	273,219	1,081,781	20.2	명시 70,000
				오산 용연선(모현동장례식장~용곤마을)도로확포장 사업	100,000	0	100,000	0
				함라 행진선(농도301호)도로확포장	100,000	23,000	77,000	23.0
				지방도723호선 노선지정 타당성조사	17,820	17,820	0	100.0
		지방도 도로확포장			825,076	446,739	378,337	54.1
				하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	825,076	446,739	378,337	54.1	명시 625,076
		철도건널목 개량사업			5,613,000	5,251,130	361,870	93.6
				평화육교재가설	5,613,000	5,251,130	361,870	93.6
		주민숙원사업			34,600	24,750	9,850	71.5
				주민숙원사업 (국내여비, 업무추진비)	34,600	24,750	9,850	71.5
		교통관리개선사업			1,486,913	158,559	1,328,354	10.7
				왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	401,667	43,624	358,043	10.9	명시 401,667
				낭산~시명 선형개량사업	976,317	8,909	967,408	0.9	명시 76,317
				신왕교차로 회전교차로 설치사업	108,929	106,026	2,903	97.3	명시 108,929
		도로조명시설관리			3,003,968	2,186,602	817,366	72.8
				보안등 신규 설치	343,900	132,698	211,202	38.6
				노후 가로등 정비	859,000	710,890	148,110	82.8
				가로등 · 보안등 유지관리	1,650,800	1,227,700	423,100	74.4
				가로등 보수차량 운영유지비	17,768	12,430	5,338	70.0
				보안등 신규 설치(보조)	132,500	102,884	29,616	77.6
	하천정비				23,702,433	9,192,635	14,509,798	38.8
		하천정비및유지관리			23,702,433	9,192,635	14,509,798	38.8
				지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	13,810,696	5,112,820	8,697,876	37.0	계속비 10,810,696
				지방하천정비(동면천)(전환사업)	4,105,632	22,609	4,083,023	0.6	계속비 2,595,632
				소하천정비(동산천)(전환사업)	1,277,610	1,223,905	53,705	95.8	명시 370,610
				소하천정비(진사천)(전환사업)	200,000	21,500	178,500	10.8
				하천제방 유지보수(자체)	2,947,250	1,958,103	989,147	66.4	명시 436,612
				하천제방 유지보수	700,000	317,483	382,517	45.4
				국가하천유지보수(4대강)	355,000	353,111	1,889	99.5
				국가하천유지보수(4대강외)	258,000	157,230	100,770	60.9
				만경강 물문학관 진입도로 개설공사	48,245	25,874	22,371	53.6	명시 48,245
	재무활동(건설과)				7,300	4,711	2,589	64.5
		보전지출			7,300	4,711	2,589	64.5
			보전지출		7,300	4,711	2,589	64.5
	행정운영경비(건설과)				78,242	69,740	8,502	89.1
		인력운영비			45,000	37,968	7,032	84.4
				국가하천유지보수 (인력운영비)	45,000	37,968	7,032	84.4
		기본경비			33,242	31,772	1,470	95.6
				기본경비	33,242	31,772	1,470	95.6

2021 주요성과

□ 성      과

◦ 평화육교 재가설 및 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

‣평화육교 개통(2021. 6. 22.) / 평화육교 공사 완료(2021. 9. 10.)

◦ 군도23호 도로확포장을 통한 함열 북부권·산업단지 접근성 향상 기여

‣군도23호선 도로확포장공사 완료	: 2021. 8. 15.

◦ 오산 신지 영만간 국도대체우회도로 국가예산 확보 기틀 마련

‣국도·국지도 일괄예비타당성 재정사업평가(KDI) 통과	: 2021. 8. 24.

- 도로개설 L=7.05km, B=20.0m (총사업비 1,888억원)

◦ “대판소하천” 아름다운 소하천 선정 : 행안부 주관 공모전 입상(우수상)

‣전국 지자체 대상 1차(서류심사), 2차(현장심사), 3차(최종심사) 선정

‣2022년 재해예방사업 국비(재정인센티브) 지원

◦ 만경강 파크골프장 9홀 증설

‣만경강 목천지구 파크골프장 조성공사(9홀 증설) 완료	: 2020. 9. ~ 2021. 4.

◦ 만경강 문화관 건축 및 토목공사, 콘텐츠용역 추진

‣9월말 기준 전체공정률 78%(외부마감공사) 공사중	: 2021. 1. ~ 9.

◦ 도로조명 설치 및 정비를 통한 밝은거리 조성으로 안전한 통행로 확보

‣노후가로등 정비(752개소), 보안등 교체 및 설치(166개소), 도로조명 민원처리(4,826건)

□ 반      성

◦ 지방하천정비사업 지방이양에 따른 동면천 협의지연으로 공사 미발주

‣행정절차 및 편입토지 협의 보상을 병행실시하여 하반기에 공사가 착공될 수 있도록 최선을 다하겠음

		시･군도 및 농어촌도로 확·포장 군도23호선 도로확·포장 호남고속철도 시설 개량 및 평화육교 재가설 국도27호 서수~평장간 대체우회도로 개설 익산토성 백제왕도 탐방로 조성 지방하천 왕궁천 정비사업 지방하천 동면천 정비사업 동산소하천 정비사업 진사소하천 정비사업 만경강문화관 조성사업 금강 용안생태습지 유지관리 만경강 친수시설 유지관리 하천제방 유지관리 도로조명 조도개선

1		시･군도 및 농어촌도로 확·포장

2021 주요업무결산

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 관내 17개 읍·면·동

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2022.

◦ 사업규모 : L= 28.43km, B= 5.0 ~ 24.0m

◦ 총사업비 : 30개사업 / 57,197백만원(2021년 예산 4,465)

□ 추 진 실 적

◦ 공사 완료 2개소	: 2021. 1. ~ 9.

▸군도23호 도로확포장 외 1개소

◦ 공사 중 7개소	: 2021. 1. ~ 9.

▸춘포 토다리~덕동간 도로확포장 외 6개소

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 11개소	: 2021. 1. ~ 9.

▸왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장 외 10개소

◦ 보상 중 10개소	: 2021. 1. ~ 9.

▸왕궁 온수~시대간 도로 확·포장공사 외 9개소

□ 마무리 대책

◦ 실시설계용역 완료 3개소	: 2021. 10. ~ 12.

▸춘포 노적선, 황등 하동~동연간, 시군도 도로관리 및 농어촌도로 기본계획

◦ 공사 추진 6개소	: 2021. 10. ~ 12.

▸백제왕도 탐방로(익산토성) 조성공사 외 5개소

◦ 토지매입 10개소	: 2021. 10. ~ 12.

▸오산면 소재지 진입도로확포장 외 9개소

시ㆍ군도 및 농어촌도로 사업추진현황 (계속사업)

(단위 : 백만원)

구 분	도로등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	21예산액	금 후
계		30개노선		L=28.43km B=5.0-24m	57,195	24,311	5,263	27,621
준공 (2)	시 도 (1)	68호	석왕동신왕교차로 회전교차로설치	회전교차로 1식	280	280	-	-	준공
	군 도 (1)	23호	군도23호 도로확포장	L=3.40km B=20.5m	12,500	11,500	1,000	-	준공
공사중 (7)	시 도 (1)	1268호	어양어곳-부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,100	1,250	900	950	30%
	농어촌 도 로 (5)	춘포103호 (신화선)	춘포토다리-덕동간 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,920	750	-	1,170	60%
		금마102호 (누부선)	금마누동-신촌간 도로확포장	L=0.93km B=8.0m	980	580	-	400	60%
		황등104호 (황팔선)	황등도선-외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,000	400	-	600	60%
		왕궁207호 (양곡선)	왕궁양동마을 진입도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,310	780	200	330	70%
		금마101호 (서삼선)	금마갈산-서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,829	779	100	1,950	15%
	미지정 (1)		백제왕도탐방로 (익산토성)조성공사	L=1.74km B=5.0m	1,355	70	1,285	-	45%
보상중 (10)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730	-	2,450
	군 도 (2)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.95km B=24.0m	5,000	1,100	-	3,900
		21호	왕궁온수~시대간 (황암~상발)확포장	L=3.00km B=8.0m	2,803	616	-	2,187
	농어촌 도 로 (7)	왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동-군도22호간 도로확.포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	-	700
		삼기203호 (석라선)	하나로-소간촌간 도로확포장	L=1.58km B=8.0m	1,400	600	-	800
		오산203호 (신수선)	오산역–상아마을간 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	200	200	-	-
		금마202호 (서오선)	금마신정-중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	1,500	600	-	900
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,000	130	-	870
		왕궁303호 (사곡선)	왕궁가좌마을 진입로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,116	103	-	1,013
		왕궁302호 (신평선)	왕궁평화촌~평리간 도로확포장	L=1.30km B=8.0m	3,445	180	-	3,265
실 시 설계중 (8)	군 도 (2)	19호	왕궁신호-용남 위험도로구조개선사업	L=0.50km B=8.0m	486	486	-	-	국비 50%
		9호	낭산-시명간 선형개량사업	L=0.40km B=8.0m	1,000	100	900	-	국비 50%
	농어촌 도 로 (5)	춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	-	1,400
		왕궁210호 (신기선)	왕궁군도26호선 도로확포장	L=1.70km B=8.0m	2,970	797	-	2,173
		춘포311호 (노적선)	춘포 노적선 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	700	100	500	100
		함라301호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,063	900	100	1,063
		오산301호 (용연선)	오산 용연선 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	900	-	100	800
	미지정 (1)		황등하동마을- 동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.70km B=8.0m	1,250	650	-	600
기 타 (3)			시,군도 도로관리계획 및농어촌도로기본 정비계획수립용역	1식	320	160	160	-
			서부내륙고속도로 삼기하이패스I.C 타당성조사용역	1식	70	70	-	-
			지방도723호선 노선지정 타당성조사용역	1식	18	-	18	-	준공

2		군도23호선 도로확·포장

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~ 삼기 일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 8.

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=16.5~20.5m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 12,500백만원(공사비 9,000 보상비 3,100 기타 400)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기 투자	2021년	2022년 이후	비고
시비	12,500	11,500	1,000	-

□ 추 진 실 적

◦ 공사 추진	: 2021. 1. ~ 7.

▸포장공, 부대공, 신호등, 가로등 설치 등

◦ 도로구역 및 도시계획시설(변경) 결정	: 2021. 6.

◦ 공사 완료	: 2021. 8.

□ 마무리 대책

◦ 버스승강장 8개소 설치	: 2021. 10. ~ 11.

3		호남고속철도 시설 개량 및 평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2021. 9.

◦ 사업규모

▸KTX호남고속철도 시설개량 L=864m(2선로 → 4선로)

▸평화육교 재가설 L=365.5m(4차로 → 6차로)

▸접속도로 철거 및 신설 L=770m

▸대체우회도로 L=1,068m

◦ 총사업비 : 53,418백만원(국 30,700  시 22,718)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2021년	2022년이후	비고
계	53,418	47,805	5,613	-
국 비	30,700	30,700	-	-
시 비	22,718	17,105	5,613	-

◦ 시 행 자 : 국가철도공단

◦ 토지보상 : 익   산   시

□ 추 진 실 적

◦ 평화육교 접속램프 및 교량 재가설	: 2021. 1. ~ 5.

◦ 평화육교 개통	: 2021. 6.

◦ 대체우회도로 철거 및 원상복구	: 2021. 7. ~ 8.

◦ 공사 완료	: 2021. 9.

□ 마무리 대책

◦ 기관별 사업비 분담금 최종정산	: 2021. 10. ~ 11.

◦ 평화육교 버스 및 택시운송자 화장실 및 휴게실 설치	: 2021. 10. ~ 12.

4		국도27호 서수~평장간 대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m(4차선)

◦ 총사업비 : 3,175억원(국비)

※ 동지역(월성,은기,덕기동) 토지보상금 시비 분담(금액 미정)

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청

□ 추 진 실 적

◦ 장기계속공사 총괄발주	: 2021. 1.

◦ 황등지역 집단민원 발생에 따른 관계기관 협의	: 2021. 1.

※ 관계기관 : 김수흥국회의원, 익산지방국토관리청, 익산시, 한국전력공사

▸(1차) 도로선형변경 (만석교차로~신용교차로간)에 따른 총사업비 추가확보(약250억) 및 동지역 토지보상비 익산시 분담 조건 제시	: 2021. 2. 26.

▸(2차) 도로선형변경 검토비교(안) 중 농지가 대각선 분할되지 않고 탑천과 평행되도록 선형일부 조정요청	: 2021. 3. 23.

▸(3차) 도로선형변경 검토비교 최적노선 선정 및 설계 용역사의 설계조정 검토 후 재협의 결정	: 2021. 4. 19.

◦ 장기계속공사 착공 (1,2공구)	: 2021. 6.

□ 마무리 대책

◦ 편입토지 및 지장물 손실보상	: 2021. 10. ~

◦ 1공구 민원구간 최종노선 검토	: 2021. 10. ~ 12.

5		익산토성 백제왕도 탐방로 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 금마면 서고도리 쌍능길 (삼정원 ↔ 미륵사지로까지)

◦ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2021. 12.

◦ 사업규모 : 도로확포장 L=1.74km, B=5.0m

◦ 총사업비 : 1,355백만원(시비)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2021년	2022년이후	비고
시 비	1,355	70	1,285	-

□ 추 진 실 적

◦ 사전행정절차 완료	: 2021. 5.

▸주민설명회, 농지, 산지전용, 설계심의 등

◦ 실시설계용역 완료	: 2021. 6.

※ 문화재청 현상변경허가 완료(2020. 7.)

- (허가조건) 노폭 5.0m, 연장 1.74km 중 1.16km 황토콘포장

◦ 공사착수 및 추진	: 2021. 7. ~ 현재

▸전체공정 45%(배수공 완료 및 구조물공 시공 중)

□ 마무리 대책

◦ 공사 완료	: 2021. 11.

6		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9km, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 사 업 비 : 47,368백만원(국 10,093 도 23,065 시 14,210)

(단위 : ㎞, 백만원)

구 분	위 치	연장	사업비	내용
	합 계	9.25	47,368	축제, 보축, 교량재가설(9)
1지구	익산천 합류점 ~ 흥암교	4.62	23,693	축제, 보축, 교량재가설(5)
2지구	흥암교 ~ 보석박물관	4.63	23,675	축제, 보축, 교량재가설(4)

□ 추 진 실 적

◦ 왕궁천(1지구) 공사 추진(전체 공정율 60%)	: 2019.  3. ~

▸1차분 완료	: 2019.  3. ~ 2019. 12.

▸2차분 완료	: 2019.  4. ~ 2020.  8.

▸3차분(공사중–공정율 40%)	: 2020.  1. ~ 2022.  4.

※ 교량 : 완료(발산2교, 평리고, 흥암1교), 추진중(발산교, 흥암교)

◦ 왕궁천(2지구) 공사 추진(전체 공정율 35%)	: 2020.  3. ~

▸1차분(공사중–공정율 80%)	: 2020.  3. ~ 현재

※ 교량 : 추진중(장중교, 광암2교)

□ 마무리 대책

◦ 왕궁천(1·2지구) 공사 추진	: 2022. 12.

▸미 보상토지(10%) 수용재결 병행 추진

7		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05km

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축 L=6.1km, 교량 재가설 7개소 등

◦ 사 업 비 : 15,489백만원(국 1,000 도 9,842 시 4,647)

□ 추 진 실 적

◦	관계기관 협의(전라북도, 농어촌공사)	:	2020. 6. ~ 7.
◦	소규모 환경영향평가 및 분할측량	:	2020. 9.
◦	실시설계 협의(2차, 전라북도)	:	2021. 3.
◦	편입토지 보상계획 공고 및 감정평가	:	2021. 5. ~ 9.
◦	익산시 설계자문위원회 완료	:	2021. 9.

□ 마무리 대책

◦	편입토지 협의 보상 실시	:	2021. 9. ~ 2022. 3.
◦	전라북도 총사업비 협의	:	2021. 10.
◦	건설사업관리용역 업체선정(공사감리)	:	2021. 10.
◦	장기계속공사 총괄발주 및 업체선정	:	2021. 10. ~11.
◦	공사착공	:	2021. 12.

8		동산소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 웅포면 맹산리 일원

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 8.

◦ 사업규모 : 소하천정비 L=1.02km

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=2.04km, 노후교량 재가설 6개소 등

◦ 총사업비 : 3,210백만원(국 353 시 2,857)

□ 추 진 실 적

◦ 소규모 환경영향평가 협의	: 2019.   2.

◦ 실시설계 용역 준공	: 2019.   5.

◦ 공공디자인 심의(자체)	: 2019.   9.

◦ 편입토지 감정평가	: 2019.  10.

◦ 편입토지 협의보상	: 2019.  10.

◦ 장기계속공사 총괄발주	: 2019.  12.

◦ 공사 착공	: 2020.   1.

◦ 공사 완료	: 2021.   8.

9		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 소하천정비 L=0.687km

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6km, 교량 재가설 6개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,066)

▸2021년 예산액 : 200백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 착수	: 2021.  4. 13.

▸현재 공정률 60% (2021. 9월 기준)

◦ 토질조사 용역 착수	: 2021.  4. 15.

▸현재 공정률 60% (2021. 9월 기준)

□ 마무리 대책

◦ 주민설명회 개최	: 2021. 12.

◦ 실시설계 완료	: 2022.  4.

◦ 편입토지 감정평가 및 협의보상	: 2022.  4. ~

◦ 공사 착공	: 2022.  6.

◦ 공사 완료	: 2023. 12.

10		만경강 문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 11필지

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2021.

◦ 사업규모 : 13,814㎡[지하 1층, 지상2층/연면적 1,686㎡]

◦ 사 업 비 : 11,350백만원(국 10,000 시 1,350 토지매입비)

◦ 시설현황 : 다목적실, 로비, 사무실, 카페테리아, 생태전시 및 홍보관 등

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년이후	비고
계	11,350	11,350	-	-
국 비	10,000	10,000	-	-
시 비	1,350	1,350	-	-

□ 추 진 실 적

◦ 건축 및 토목공사 등 추진(익산지방국토관리청)	: 2021.  1. ~  9.

▸9월말 기준 전체공정 78%(외부 마감공사 중)

◦ 전시물 설계·제작·설치를 위한 콘텐츠 실시설계 용역완료	: 2021.  6.

◦ 만경강문화관 운영 및 관리 조례 제정 입법예고	: 2021.  9. ~

□ 마무리 대책

◦ 시설공사 및 전시물 콘텐츠 제작 설치 완료(익산지방국토관리청)	: 2021. 12.

◦ 만경강문화관 인계인수(익산지방국토관리청 → 익산시)	: 2022.  1.

◦ 만경강문화관 관리·운영	: 2022.  2.

11		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 용안생태습지(670,000㎡)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 전망데크 제방 연결로포장, 주차장 등 편의시설 정비, 노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 1,105백만원(국 400 시 705)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년이후	비고
계	1,105	-	-	1,105
국 비	400	-	-	400
시 비	705	-	-	705

□ 추 진 실 적

◦ 보강공사 실시설계 및 대전지방국토관리청 하천점용허가 완료	: 2021. 4. 4.

▸용안생태습지 전망데크 연결도로 포장공사, 광장진입도로 포장공사

◦ 관광활성화를 위한 조경시설 보강공사 추진(785백만원)	: 2021.  3. ~  9.

▸완료 : 용안생태습지 산책로 풀깎기공사, 홍련지 진입부데크 재정비공사 전망데크 제방 연결로 포장공사, 광장진입로 포장, 산책로 황토 장보수

▸추진중 : 용안생태습지 광장 그늘막 설치공사(추경확보-설계중)

◦ 금강 용안생태하천 환경정비 추진(275백만원)	: 연중

▸하천환경정비 기간제 근로자 30명

▸다년생 및 계절꽃 초화류식재, 제초 및 예초작업 등

◦ 국가하천 금강 하천관리 [공무직근로자(45백만원)]	: 연중

□ 마무리 대책

◦ 관광활성화를 위한 조경시설 보강 완료	: 2021. 11.

◦ 금강 용안생태하천 환경정비 완료	: 2021. 12.

12		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강(L=28km) 6개 하천환경정비사업지구

구 분	준 공	주 요 시 설	비 고
신 지	2016	자전거도로 5.42km, 친수공간 등
목 천	2016	자전거도로 2.32km, 파크골프장 등
춘 포	2016	자전거도로 4.0km, 축구장, 수변공원 등
화 전	2018	자전거도로 1.3km, 구담교, 친수공간 등
반 월	2021	자전거 2.8km, 축구,야구,족구,농구장,인라인 등
마 산	2021	자전거도로 5.87km, 친수공간 등

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 친수시설관리, 자전거도로 제초, 예초, 시설물보수 등

◦ 총사업비 : 402백만원(국 258 시 144)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년이후	비고
계	402	-	-	402
국 비	258	-	-	258
시 비	144	-	-	144

□ 추 진 실 적

◦ 보강시설물 실시설계용역 완료	: 2021.  5. 17.

◦ 관광활성화를 위한 친수시설 기능보강공사 추진(382백만원)	: 2021.  3. ~  9.

▸완료 : 용안생태습지 산책로 풀깎기공사, 홍련지 진입부데크 재정비공사 전망데크 제방 연결로 포장공사, 광장진입로 포장, 산책로 황토 장보수

▸추진중 : 반월마산지구 휴게시설 설치, 사수정 그늘막(추경확보-설계중)

◦ 만경강 하천환경정비 추진(20백만원)	: 연중

▸기간제 근로자 2명 쓰레기 줍기, 예초, 제초, 화장실 등 청소

□ 마무리 대책

◦ 관광활성화를 위한 친수시설 기능보강 완료	: 2021. 11.

◦ 만경강 하천환경정비 완료	: 2021. 12.

13		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소(L=187.2km), 소하천 62개소(L=102.2km)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 집중호우대비 시설물보수, 하상준설, 지장물제거, 제방 및 호안 제초, 예초 등

◦ 총사업비 : 2,292백만원(도 350 시 1,942)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년이후	비고
계	2,292	-	-	2,292
도 비	350	-	-	350
시 비	1,942	-	-	1,942

□ 추 진 실 적

◦ 지방 및 소하천 유지관리사업 추진

구분	단위사업별	사업비	주 요 내 용	실 적
수해복구	왕궁 쌍제천 하천준설	50	퇴적토준설	완 료
	금마 황동천 제방보수	32	제방보수	완 료
	삼기 기양천 석축보수	50	호안 석축보수	완 료
	팔봉 갈전천 석축보수	70	호안 석축보수	공사중
	낭산 죽림천 죽림1교 보수	120	소교량 재가설	완 료
	망동천 배수암거 설치공사	150	수로암거(교량) 설치공사	설계중
	삼기면 필동9교 보수공사	20	소교량 보수공사	완 료
	탑천 하상준설	300	퇴적토준설	공사중
	죽청천, 부상천 등 유지보수	700	퇴적토준설, 잡목제거 등	공사중
	수해 등 응급복구공사	100	21년 수해 등 응급복구	연 중
지방·소하천 유지관리		500	지방 및 소하천 유지관리	연 중
산북천 제방도로 포장		131	제방포장	완 료
탑천~망동천 도로포장		20	제방포장	설계중
만경강 춘포면 제방진입로 아스콘 덧씌우기		30	제방진입로 아스콘 덧씌우기	설계중
오산제 등 9개소 정기안전점검용역		13	하반기 안전점검용역	용역중
탑천 제초작업		6	재방도로 제초	완 료

□ 마무리 대책

◦ 지방 및 소하천 유지관리사업 완료	: 2021. 12.

14		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사업예산 : 1,331백만원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행 불편지역 도로조명 보수 및 설치

(단위 : 백만원)

구 분	세 부 사 업	사 업 개 요	예 산	비고
합 계		13개 사업	1,331
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등 신규설치 1식	342
노 후 가 로 등 정 비	도심지역 가로등 유지보수	도심지역 고장 가로등 수리	120
	산업단지 가로등 유지보수	산업단지 고장 가로등 수리	60
	가로등 노후 점멸기 교체공사	노후 점멸기 교체 1식	22
	읍면 지역 보안등 보수	읍면지역 고장 보안등 수리	120
	동지역 보안등 보수	동지역 고장 보안등 수리	90
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체 1식	42
	전기 안전점검 부적합 보수단가	안전점검 부적합 설비 보수	30
	도심지역 노후가로등 교체공사	노후 가로등 정비 1식	100
	노후가로등 LED 교체공사	LED등기구 교체 1식	100
	산업단지 조도 개선공사	램프(안정기) 교체 1식	80
	별빛달빛 프로젝트 사업	LED램프 교체 1식	58
	원광고등학교 통학로 가로등 개선공사	LED가로등 설치 1식	35	1차추경
보 안 등 신규설치 (보조)	영등1동 밝은마을 만들기 사업	LED등기구 교체‧정비 1식	80	1차추경 (도 보조)
	용안면 덕용마을 외 8개소 보안등 설치	보안등 신규설치 1식	12	1차추경 (도 보조)
	동산동 명소안내 선 그리기(보안등 보수) 사업	LED등 교체 1식	40	1차추경 (도 보조)

□ 추 진 실 적

◦ 보안등 신규설치

▸보안등 166개소 신규 설치(129백만원 집행)	: 2021.  1. ~  9.

◦ 노후가로등정비

▸노후 가로등 600개소 교체, 철거 등 정비(698백만원 집행)	: 2021.  1. ~  9.

◦ 보안등 신규설치(보조)

▸가로(보안)등 152개소 LED교체 및 정비(76백만원 집행)	: 2021.  6. ~  9.

□ 마무리 대책

◦ 보안등신규설치, 노후가로등정비 등 잔여사업 완료	: 2021. 12.