2022. 1.

제240회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 계획

	환경안전국

시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 주요성과 및 반성
□	2022 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전예방 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 CCTV 운영을 통한 시민중심의 안전망 구축

일   반   현   황

□ 기        구

						시민안전과
안전총괄			사회재난				자연재난				방재시설				민 방 위			CCTV

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24		1	6	7	5	5
현 원	24		1	8	4	4	7
증 감				2	△3	△1	2

□ 사 무 분 장

◦ 안전관리계획 수립, 안전신문고 운영관리, 시민안전보험, 재난관리기금, 재난분야 위기관리매뉴얼 관리, 재난안전상황실, 안전문화교육 등

◦ 재난안전통합지원본부 운영(사회재난), 재난대응 안전한국훈련, 유‧도선사업, 승강기 보수업 등록 및 관리, 지역축제 안전관리, 어린이 놀이시설 관련 등

◦ 재난안전통합지원본부 운영(자연재난), 배수펌프장 및 배수문 유지관리, 가뭄‧한파‧폭염 종합대책, 자연재난 사전대비, 예‧경보시설, 그늘막 관리

◦ 사전재해영향성 검토 우수저류시설 사업, 재해예방 및 복구 사업, 자연재해위험지구 정비사업, 급경사지 관리, 소규모위험시설 취합 등

◦ 국가기반체계 보호 및 비상대비관련, 을지‧화랑‧충무훈련, 충무계획, 민방위시설 및 장비관리, 통합방위협의회 운영, 민방위 기본계획 수립, 사회복무요원관리 등

◦ 통합관제센터용 CCTV 설치 및 유지보수 관리, 마을방범용 CCTV설치 및 유지보수 지원, 통합관제센터 모니터링 용역관리 등

□ 재해취약시설 현황

구 분	계	대규모 공사장	배 수 펌프장	수 문	게이트 펌 프	산사태	인명피해 우려지역
개소	78	9	9	11	1	31	17

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	17개소	-	102개소	6개소	36개소	15,425점

□ CCTV 설치 현황

구 분	총 계	통합관제센터 관리					자체관리 (마을방범용)
		소 계	방범용	차량번호 판 독 용	아동용	어 린 이 보호구역
개소	1,491	849	556	90	83	120	642
대수	5,180	2,643	1,915	124	173	431	2,537

□ 위원회 현황

구 분	구 성	근 거
안전관리위원회	15명(당연직15)	익산시 안전관리위원회의 구성 및 운영에 관한 조례
재난관리기금 운용심의위원회	9명(당연직6, 위촉직3)	익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례
안전관리민관 협력위원회	19명(당연직7, 위촉직12)	익산시 안전관리민관협력위원회 구성 및 운영 조례
재해영향평가 심의위원회	17명(당연직2, 위촉직15)	익산시 재해영향평가심의위원회 구성 및 운영 규칙

2021 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 코로나19 대응 추진

‣자가격리자 모니터링 추진                  : 11,094명

- 접촉자 8,880명, 해외입국자 2,214명

- 자가격리자 생필품 등 배송서비스 업무 협약(자활기업) : 2021. 12. 9.

‣다중이용시설 현장점검 추진(주1~2회)       : 47개 업종, 8,666개소

‣익산시 재난안전대책본부 운영 : 긴급방역대책 회의 등 112회

‣도 긴급재난지원금 지급(카드발급매수/지급실적)  : 281,060매/274,348명

◦ 조기경보시스템 구축	: 2지구(여산, 판문지구)

◦ 배수펌프장 노후CCTV 교체	: 37개(유천 외 7개소)

‣유천9, 목천7, 고잔4, 대장5, 신천5, 배산1, 마동4, 삼양2

◦ 배수펌프장 및 배수문 정기‧정밀안전 점검

‣정기안전점검 상반기 19개소 / 하반기 10개소

‣정밀안전점검 9개소

◦ 재해예방 사업 추진

‣인화지구 우수저류시설 공사 착공 및 추진

‣재해위험개선지구 정비사업 착수	: 4개소(석천대, 석탄, 판문, 여산)

‣급경사지 정비사업 착수	: 4개소(송천, 성당, 수동, 아리랑)

‣자연재해저감 종합계획 재수립용역 착수 및 행정절차 이행

◦ 시민의 생명과 재산보호를 위한 용도별 CCTV 설치    : 126개소  403대

‣통합관제센터 관리용                            : 66개소   215대

‣마을자체 관리용                                 : 60개 마을  188대

◦ 마을방범용 CCTV 유지보수 지원                   : 123개 마을 342대

□ 반      성

◦ 코로나19 지역 확산 방지를 위한 안전문화교육 등 안전캠페인 활동 위축

		시민안전보험 및 안전사고 예방활동추진 국가안전대진단 추진 코로나19 대응 추진 화재 대피용 방연 마스크 구입 및 비치 제3종 시설물 지정 실태조사 용역 배수펌프장‧배수문 정기‧정밀안전점검 배수펌프장 및 배수문 유지보수 재난재해예방 시설물 유지관리 용역 인화지구 우수저류시설 설치공사 석탄 재해위험개선지구 정비사업 여산 재해위험개선지구 정비사업 판문 재해위험개선지구 정비사업 급경사지 정비사업 국가 비상대비훈련 및 실용적 민방위훈련 CCTV통합관제센터 운영 및 용도별 CCTV 설치

2022 주요업무계획

1		시민안전보험 및 안전사고 예방활동 추진

□ 사 업 개 요

◦ 익산시 시민안전보험 가입

▸기    간 : 2022. 3. ~ 2023. 2.

▸대    상 : 익산시민(등록외국인 포함)

▸사 업 비 : 110백만원(도 23, 시 87)

▸보장내용 : 사망 및 후유 장해정도에 따라 결정(13개 항목)

- 폭발‧화재‧붕괴‧산사태, 대중교통이용, 강도, 농기계사고 상해 사망 및 후유장해

- 자연재해, 익사 사고, 뺑소니‧무보험차, 감염병 사망

- 스쿨존 교통상해 부상치료비

▸보장금액 : 보장내용에 따라 최대 1천만원 한도

◦ 안전사고 예방을 위한 안전활동 추진

▸기    간 : 2022. 1. ~ 12.

▸사 업 비 : 12백만원

▸사업내용 : 맞춤형 안전문화교육 및 안전점검의 날 행사 운영

□ 추 진 계 획

◦ 익산시 시민안전보험 추진

▸익산시 시민안전보험 가입 추진계획 수립	: 2022. 1.

▸시민안전보험 가입 및 보험청구 안내	: 2022. 2.

◦ 안전사고 예방을 위한 안전활동 추진

▸맞춤형 안전문화교육 수요조사 및 계획 수립	: 2022. 2.

▸안전문화교육 실시 및 안전점검의 날 운영	: 2022. 3. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 일상생활에서 발생할 수 있는 재난‧재해 사고로부터 시민을 보호하고 사고발생시 보장 혜택으로 생활안정에 기여

2		국가안전대진단 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 점검대상 : 건축시설, 교통시설, 생활 및 여가, 문화재, 환경 및 에너지 등

▸최근 사고발생 및 국민관심 분야 위주로 선정

▸부처 및 지자체 기준에 따라 실시하는 점검대상(부처위임, 자체선정)

◦ 총사업비 : 20백만원(재난관리기금)

◦ 점검내용 : 시설물의 구조적 안전성, 안전관리실태, 법·제도 등

◦ 점검주체 : 시, 시설관리주체, 민간전문가(시설, 전기, 가스, 소방 등)

◦ 점검방법 : 점검지침(점검표)에 의거 점검대상시설 민·관 합동점검

※ 2021년 국가안전대진단 추진에 대한 평가 결과 최우수 선정

□ 추 진 계 획

◦ 국가안전대진단 세부 추진계획 수립	: 2022. 8.

◦ 민관합동점검 기동반 구성	: 2022. 8.

◦ 자율점검 실천을 위한 캠페인 전개(단체, 협회 등)	: 2022. 8. ~ 9.

◦ 국가안전대진단 추진(민관 합동점검 및 현장점검)	: 2022. 8. ~ 9.

◦ 국가안전대진단 후속조치 강화(점검결과 공개, 후속조치 이행확인 등)	: 2022. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 국가안전대진단 추진으로 대대적인 시설물 점검을 통해 위험요인을 예찰·해소하여 안전사고 예방 및 안전의식 제고

3		코로나19 대응 추진

□ 사 업 개 요

◦ 자가격리자 전담공무원 확대 편성 운영

▸자가격리 모니터링 전담공무원 확대 : 315명 → 400명

(자가격리자 전담공무원 258명, 재택치료자 전담공무원 142명)

▸자가격리자 모니터링 추진 : 자가격리자 수칙 안내 및 이탈여부 확인 등

◦ 다중이용시설 방역 수칙 이행여부 현장점검 : 47개 업종, 8,666개소

▸밀집도‧밀폐도 등 시설별 위험도 평가에 따른 시설분류

- 1그룹 : 6개 업종, 2그룹 : 7개 업종, 3그룹 : 18개 업종, 기타 16개 업종

▸민‧관 합동 방역점검반 구성 : 4개반 111명 (지휘부 및 민간 단체‧협회 포함)

◦ 사회적 거리 두기 행정명령 조정

▸사회적 거리두기 행정명령 시행, 공공시설 폐쇄 및 개방 여부 조정

□ 추 진 계 획

◦ 코로나19 재난안전대책본부 운영	: 상황 종료 시 까지

▸코로나19 대응 방역 대책회의 및 코로나19 대응 일일상황 보고

◦ 자가격리자 모니터링 추진	: 상황 종료 시 까지

▸자가격리자, 재택치료자 전담공무원 확대 편성 : 2022. 1.

▸자가격리자 모니터링 (1일 2회 자가진단,  GIS 수시 점검 등)

▸자가격리자 물품(위생키트, 생필품 등) 배송(자활기업 연계)

◦ 다중이용시설 방역 수칙 이행여부 현장점검    : 상황 종료 시 까지

▸방역수칙 위반시설 강력한 행정조치, 특별 현장점검 실시

◦ 코로나19 행정명령 이행시설 도 재난지원금 지급 : 개소당 80만원 현금 지급 (도비)

□  기 대 효 과

◦ 자가격리자 모니터링 지속 추진을 통한 자가격리자 관리 강화

◦ 자발적 방역수칙 이행 문화 조성을 위한 협회‧단체와 간담회 및 대시민 홍보 전개

4		화재 대피용 방연 마스크 구입 및 비치

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사 업 비 : 16백만원(시비)

◦ 사 업 량 : 화재대피용 방연마스크 약 280장 구입(보관함 28개 포함)

◦ 사업내용 : 화재 발생 시 대응 취약시설인 장애인․노인복지관 비치

▸1개소당 40~70장 비치(이용자 등 운영규모 파악 후 결정)

□ 추 진 근 거

◦「익산시 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원 조례」제3조, 제6조

□ 추 진 계 획

◦ 화재대피용 방연마스크 비치 장소 선정              : 2022. 1. ~ 2.

◦ 화재대피용 방연마스크 구입 및 비치	: 2022. 3. ~ 4.

◦ 2022년도 방연마스크 비치 장소 수요 조사 및 예산편성  : 2022. 8.

□ 기 대 효 과

◦ 화재 취약계층 이용시설에 방연마스크 비치로 화재 긴급 상황 발생시 인명사고 최소화

◦ 화재 사고 사망자의 40% 이상이 유독가스 등에 노출로 희생되는 점을 감안, 진압시까지 골든타임 확보로 시민의 생명 보호 기반 마련

5		제3종 시설물 지정 실태조사 용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 50백만원(시비)

◦ 사 업 량 : 공동주택 및 건축물 141개소

▸공동주택 73개동, 종교시설 7개소, 병원 4개소, 체육시설 1개소, 기타 56개소

◦ 사업내용 : 시설물 실태조사 실시 후 안전상태 산정 등 조사용역 실시

◦ 추진근거 :「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제8조

□ 추 진 계 획

◦ 2022년 제3종 시설물 실태조사 용역 대상 조사	: 2021. 6.

◦ 제3종 시설물 지정 실태조사 용역 발주	: 2022. 3.

◦ 안전등급 지정을 위한 안전상태 산정 등 조사	: 2022. 4. ~ 10.

◦ 제3종 시설물 지정 실태조사 용역 준공	: 2022. 11.

◦ 제3종 시설물 지정․고시                          : 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 재난발생 위험이 있거나 지속적인 관리가 필요한 시설물에 대하여 제3종 지정․관리를 통한 체계적인 안전관리 도모

6		배수펌프장, 배수문 정기 ‧ 정밀안전점검

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10.

◦ 사업대상 : 19개소(배수펌프장 9, 배수문 10)

◦ 총사업비 : 185백만원(도 26.1, 시 158.9)

‣정기안전점검 : 98백만원(시 98)

‣정밀안전점검 : 87백만원(도 26.1, 시 60.9)

◦ 사업내용 : 배수펌프장 및 배수문 정기‧정밀안전점검

‣상반기 정기안전점검 19개소(배수펌프장 9, 배수문 10)

‣하반기 정기안전점검 9개소(배수펌프장 2, 배수문 7)

※ 정기안전점검 주기 : 2회/1년

‣정밀안전점검 10개소(배수펌프장 7, 배수문 3)

※ 정밀안전점검 주기 : 1회/2년

◦ 관련근거 :「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조 및 같은법 시행령 제8조

□ 추 진 계 획

◦ 상반기 정기안전점검 계약심사 및 발주	: 2022. 1. ~ 2.

◦ 정밀안전점검 계약심사 및 발주	: 2022. 2. ~ 3.

◦ 상반기 정기안전점검 완료                           : 2022. 6.

◦ 하반기 정기안전점검 계약심사 및 발주                : 2022. 6.

◦ 정밀안전점검 완료                                  : 2022. 9.

◦ 하반기 정기안전점검 완료                           : 2022. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 여름철 자연재난을 대비하는 익산시 중추 시설물의 정확 세밀한 안전점검 용역을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하여 재난을 예방

7		배수펌프장 및 배수문 유지보수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 배수펌프장 및 배수문 유지보수

◦ 총사업비 : 35백만원(시비)

‣배수펌프장 및 배수문 전기설비 유지보수 : 15백만원

- 연동배수펌프장 보호계전기 교체 1식

- 유천배수펌프장 UPS 교체 1식 및 기타 1식

‣유천, 목천 외 6개소 배수문 유지보수 : 20백만원

- 수문 개도계 보수 1식

- 권양기 자동/수동 전환 장치 1식

- 수중펌프 분해점검 및 보강 1식

□ 추 진 계 획

◦ 배수펌프장 및 배수문 상시점검                    : 2022. 1. ~ 12.

◦ 점검 결과에 따른 부품 교체 및 수리               : 2022. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 배수펌프장 및 수문 유지관리에 만전을 기하여 여름철 자연재난으로부터 소중한 익산시민의 생명과 재산을 보호

8		재난재해예방 시설물 유지관리 용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

‣조기경보시스템(자동음성통보시스템 포함) 유지관리 용역

‣펌프장, 기상관측 CCTV 유지관리 용역

‣재해문자전광판 유지관리 용역

◦ 총사업비 : 58백만원(시비)

‣조기경보시스템(자동음성통보시스템 포함) 유지관리 : 20백만원

‣펌프장,기상관측 CCTV 유지관리 : 20백만원

‣재해문자전광판 유지관리 : 18백만원

□ 추 진 계 획

◦ 유지보수 용역 계약 및 착수                            : 2022.  1.

◦ 유지보수 용역 준공                                    : 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 재난재해예방 시설물 유지관리에 만전을 기하여 각종 재난재해로부터        소중한 익산시민의 생명과 재산을 보호

9		인화지구 우수저류시설 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 6.

◦ 사업위치 : 익산시 주현동 203번지, 동산동 1048번지

◦ 총사업비 : 23,000백만원(국 11,500, 도 3,450, 시 8,050)

▸기 확보 사업비 : 20,900백만원 [국 11,500, 도 3,450, 시 5,950]

▸2022년 사업비 : 2,100백만원 (코로나 19로 매칭사업비 미확보액)

◦ 사업내용 : 우수저류시설 설치 18,850㎥(인화1 : 8,500㎥, 인화2 : 10,350㎥)

◦ 현공정률 : 50%(1지구 : 터파기, 2지구 : 내벽설치중)

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2018. 3.

◦ 인화지구 우수저류시설 실시설계 심의(행정안전부)	: 2019. 7.

◦ 기본 및 실시설계 용역 준공                              : 2020. 4.

◦ 공사 착공	: 2020. 4.

□ 추 진 계 획

◦ 시범운행                                                : 2023. 4.

◦ 공사준공                                                : 2023. 6.

10		석탄 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 석탄동 1016-91번지 일원

◦ 총사업비 : 25,000백만원 [국(50%) 12,500, 도(20%) 5,000, 시(30%) 7,500]

‣2022년 사업비 : 7,400백만원 [국(50%) 3,700, 도(20%) 1,480, 시(30%) 2,220]

‣2023년 이후 사업비 : 8,100백만원 [국(50%) 4,050, 도(20%) 1,620 시(30%) 2,430]

◦ 사업내용 : 펌프장 및 펌프 8개소 설치

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 착수	: 2020.  6.

◦ 방재신기술 심의 완료	: 2020.  9.

◦ 관련부서 협의	: 2020.  10. ~

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 심의(행정안전부)	: 2022.  2.

◦ 실시설계 준공	: 2022.  4.

◦ 공사 착공	: 2022.  5.

◦ 공사 준공	: 2024.  12.

□ 기 대 효 과

◦ 강우로 인한 저지대 주거지 및 농경지의 상습적인 침수로 인한 피해를 방지하고자 목천포천의 펌프를 증설하여 시민의 생명과 재산을 보호

11		여산 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 여산면 여산리 412-4번지 일원

◦ 총사업비 : 38,000백만원 [국(50%) 19,000, 도(20%) 7,600, 시(30%) 11,400]

‣2022년 사업비 : 4,000백만원 [국(50%) 2,000, 도(20%) 800, 시(30%) 1,200]

‣2023년 이후 사업비 : 32,000백만원 [국(50%) 16,000, 도(20%) 6,400, 시(30%) 9,600]

◦ 사업내용 : 배수로 신설(L=350m), 우수관로 정비(L=4,800m), 펌프장 및 저류지 1개소(V=3,400㎥) 등

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 착수                                    : 2021. 12.

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 심의(행정안전부)	: 2022. 11.

◦ 실시설계 준공	: 2022. 12.

◦ 공사 착공	: 2023.  1.

◦ 공사 준공	: 2025. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 강우로 인한 저지대 주거지 및 농경지의 상습적인 침수로 인한 피해를 방지하고자 내수배제 시설인 배수로 정비 및 펌프장을 설치하여 시민의 생명과 재산을 보호

12		판문 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 춘포면 용연리 529-5번지 일원

◦ 총사업비 : 4,000백만원 [국(50%) 2,000, 도(20%) 800, 시(30%) 1,200]

‣2022년 사업비 : 1,000백만원 [국(50%) 500, 도(20%) 200, 시(30%) 300]

‣2023년 이후 사업비 : 2,820백만원 [국(50%) 1,410, 도(20%) 564, 시(30%) 846]

◦ 사업내용 : 수로정비 L=411m, 암거신설 L=150m(5.0x1.5) 우수관로 정비 L= 534m

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 착수                                    : 2021. 5.

◦ 관련부서 협의                                          : 2021. 7. ~

◦ 주민설명회 개최                                       : 2021. 11.

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 심의(전라북도)	: 2022.  3.

◦ 실시설계 준공	: 2022.  4.

◦ 공사 착공	: 2022.  5.

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 강우로 인한 저지대 주거지 및 농경지의 상습적인 침수로 인한 피해를 방지하고자 내수배제 시설인 배수로를 정비하여 시민의 생명과 재산을 보호

13		급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 송천지구 급경사지 정비사업

‣기    간 : 2020. 1. ~ 2023. 10.

‣위    치 : 익산시 웅포면 송천리 산33-4, 산 131번지 일원

‣사업내용 : 급경사지 사면정비 L=7,000㎡

‣총사업비 : 2,000백만원 [국(50%) 1,000, 도(20%) 400, 시(30%) 600]

- 2022년 사업비 : 800백만원 [국(50%) 400, 도(20%) 160, 시(30%) 240]

◦ 성당지구 급경사지 정비사업

‣기    간 : 2020. 1. ~ 2023. 11.

‣위    치 : 익산시 성당면 성당리 503번지 일원

‣사업내용 : 급경사지 사면정비 1,000㎡

‣총사업비 : 2,000백만원 [국(50%) 1,000, 도(20%) 400, 시(30%) 600]            - 2022년 사업비 : 800백만원 [국(50%) 400, 도(20%) 160, 시(30%) 240]

◦ 아리랑지구 급경사지 정비사업

‣기    간 : 2021. 1. ~ 2024. 6.

‣위    치 : 익산시 낭산면 낭산리 산 174-1번지 일원

‣사업내용 : 급경사지 사면정비 L=2,000㎡

‣총사업비 : 4,000백만원 [국(50%) 2,000, 도(20%) 800, 시(30%) 1,200]

- 2022년 사업비 : 1,400백만원 [국(50%) 700, 도(20%) 280, 시(30%) 420]

- 2023년 이후 사업비 : 2,440백만원 [국(50%) 1,220, 도(20%) 488, 시(30%) 732]

◦ 용두산지구 급경사지 정비사업

‣기    간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

‣위    치 : 익산시 용안면 용두리 산 5-2번지 일원

‣사업내용 : 급경사지 사면정비 L=7,500㎡

‣총사업비 : 10,000백만원 [국(50%) 5,000, 도(20%) 2,000, 시(30%) 3,000]

- 2022년 사업비 : 1,000백만원 [국(50%) 500, 도(20%) 200, 시(30%) 300]

- 2023년 이후 사업비 : 9,000백만원 [국(50%) 4,500, 도(20%) 1,800, 시(30%) 2,700]

□ 추 진 계 획

◦ 송천지구 급경사지 정비사업

‣공사 착공                                           : 2021. 10. ~

‣공사 준공                                          : 2023. 10.

◦ 성당지구 급경사지 정비사업

‣공사 착공                                          : 2021. 11. ~

‣공사 준공                                          : 2023. 11.

◦ 아리랑지구 급경사지 정비사업

‣실시설계 심의(전라북도)                              : 2022. 3.

‣실시설계 준공                                        : 2022. 4.

‣공사 착공                                            : 2022. 6.

‣공사 준공                                            : 2024. 6.

◦ 용두산지구 급경사지 정비사업

‣실시설계 발주	: 2022.  2.

‣실시설계 심의 (행정안전부)	: 2022. 11.

‣실시설계 용역 준공	: 2022. 12.

‣공사 착공	: 2023.  1.

‣공사 준공	: 2025. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 기존의 암반사면에 동결융해 등으로 풍화되어 지속적으로 낙석이 발생하는 지역을 보수‧보강

◦ 기존의 인공비탈면 일부구간에 강우에 의한 세굴 및 유실의 흔적이 있어 해당구간 보수‧보강

◦ 도로개설시 법면처리 미흡 등으로 깍기부에 남아 있던 절리의 풍화로 인한 낙석이 발생 해당구간을 보수‧보강하여 시민의 인명과 재산 보호

14		국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

□ 사 업 개 요

◦ 국가 비상대비 훈련	: 을지태극연습, 화랑훈련

◦ 민방위 대원 관리	: 13,597명(2021.12.26.기준)

‣1~4년차 대원 : 5,735명,  5년차 이상 대원 : 7,862명

◦ 민방위 시설 관리	: 161개소

‣민방위 경보시설 17개소, 대피시설 102개소, 비상급수시설 42개소

□ 추 진 계 획

◦ 비상대비 훈련

‣을지태극연습	: 5월중(예정)

‣화랑훈련	: 8월중(예정)

◦ 민방위 편성 및 운영(코로나19로 인한 미확정)

‣민방위대 편성 완료	: 2022. 1. 10.

‣민방위대원 교육 실시	: 2022. 3. ~ 11.

‣참여형(재난, 기타훈련) 민방위교육 실시	: 연중

‣지원민방위대(여성민방위대) 경진대회	: 연중

‣민방위 훈련 실시	: 4회

◦ 익산시 통합방위 협의회 개최	: 4회(분기별)

◦ 민방위 시설장비 유지관리 (161개소)	: 연중

◦ 민방위 화생방 장비(휴대용 제독기) 구입(3개, 120만원) : 2022. 3.

◦ 지역민방위대 구급함 교체(140세트, 5백만원)	: 2022. 4.

◦ 비상급수시설 관정 사후관리(1개소, 3백만원)           : 2022. 4.

◦ 민방위 경보시설 신규구축(1개소, 40백만원)	: 2022. 4.

◦ 민방위 경보시설 노후 충전지 교체(3개소, 7백만원)	: 2022. 5.

□ 기 대 효 과

◦ 국가적 비상, 재난 사태에 대비한 민방위 시설·장비의 사전점검과 실용적 민방위 교육훈련을 통한 비상대비 태세 확립

15		CCTV통합관제센터 운영 및 용도별 CCTV 설치

□ 사 업 개 요

◦ 용도별 CCTV 설치현황                     (2021. 12월말, 개소/대수)

합 계	통합관제센터 관리					마을관리
	계	방 범 용	차량번호판독용	아 동 용	어린이보호용
1,491/5,180	849/2,643	556/1,915	90/124	83/173	120/431	642/2,537

◦ CCTV 통합관제센터 민간위탁 운영

‣위탁기간 : 2022. 1. ~ 12.

‣사 업 비 : 679백만원

‣운영방법 : 24시간 모니터링(12명/3조 2교대 근무), 경찰 3명 협업

◦ CCTV 및 통합관제센터 유지보수 관리

‣사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

‣사 업 비 : 451백만원

‣대    상 : 2,643대(방범 1,915, 차량판독 124, 아동보호 173, 어린이보호 431)

◦ 용도별 CCTV 설치

‣사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

‣사 업 비 : 1,080백만원

‣내   용 : 용도별 CCTV 78개소 설치(센터용 46개소, 마을방범용 32개소)

□ 추 진 계 획

◦ CCTV 통합관제센터 유지보수 계약                        : 2021. 12.

◦ CCTV 통합관제센터 모니터링 계약                        : 2022.  1.

◦ 용도별 CCTV 설치                                        : 2022.  1. ~

□ 기 대 효 과

◦ 용도별 CCTV 설치하고 안정적으로 운영하여 범죄예방 및 각종      사건·사고로부터 시민의 생명과 재산 보호