2022. 1.

제240회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 계획

	건설국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 주요성과 및 반성
□	2022 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	4	9	4	4
현 원	21 (정원외 1)		1	7	8 (정원외 1)	3	2
증 감	△1		-	3	△1	△1	△2

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설계	:	시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업, 철도건널목개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등 업무지원
	◦	하천시설계	:	하천기본계획수립, 지방하천환경정비사업, 소하천정비사업
	◦	하천관리계	:	하천유지관리(국가,지방,소하천), 용안생태습지유지관리 만경강 친수시설 유지관리, 하천점용허가 및 골재채취허가
	◦	가로등관리계	:	가로등·보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 가로등·보안등 관련 생활민원

□ 하 천 현 황

구 분	개 소	하천현황(km)			개수율 (%)	기본계획수립
		계	개 수	미개수		개소	연장(km)
계	92	323.63	154.78	168.85	47	85	305.67
국가하천	3	34.20	34.20	-	100	3	34.20
지방하천	27	187.23	92.41	94.82	49	20	169.27
소 하 천	62	102.20	28.17	74.03	27	62	102.20

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
473	404	-	69	2,679,282	224,739	-	2,454,543

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,323개	19,595개	10,728개

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2021 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 평화육교 재가설 및 KTX호남고속철도의 안전한 교통망 구축

‣평화육교 개통(2021. 6. 22.) / 평화육교 공사 완료(2021. 9. 10.)

◦ 군도23호 도로확포장을 통한 함열 북부권·산업단지 접근성 향상 기여

‣군도23호선 도로확포장공사 완료	: 2021. 8. 15.

◦ 오산 신지 영만간 국도대체우회도로 국가예산 확보 기틀 마련

‣국도·국지도 일괄예비타당성 재정사업평가(KDI) 통과	: 2021. 8. 24.

- 도로개설 L=7.05km, B=20.0m (총사업비 1,888억원)

◦ “대판소하천” 아름다운 소하천 선정 : 행안부 주관 공모전 입상(우수상)

‣전국 지자체 대상 1차(서류심사), 2차(현장심사), 3차(최종심사) 선정

‣2022년 재해예방사업 국비(재정인센티브) 지원

◦ 만경강 파크골프장 9홀 증설

‣만경강 목천지구 파크골프장 조성공사(9홀 증설) 완료	: 2021. 4.

◦ 만경강 문화관 조성사업 완료

▸총면적 13,814㎡(지하1층/지상2층, 연면적 1,686㎡)	: 2021. 12.

- 문화관 조성공사 : 전시관, 다목적실, 야외광장, 공원, 주차장 등

- 전시물 제작·설치 용역 : 문화·생태 전시 및 체험 공간 조성

◦ 도로조명 설치 및 정비를 통한 밝은거리 조성으로 안전한 통행로 확보

‣노후가로등 정비(931개소), 보안등 교체 및 설치(260개소), 도로조명 민원처리(6,726건)

□ 반      성

◦ 시군도 농어촌도로 편입토지 협의매입이 지연되어 예산집행률이 다소 저조함 앞으로는 토지수용재결절차를 병행하여 사업추진에 차질이 없도록 노력하겠음

2022 주요업무계획

		시·군도 및 농어촌도로 확포장
		서수~평장간 국도대체우회도로 개설
		오산 신지~영만간 국도대체우회도로 개설
		지방하천 왕궁천 정비사업
		지방하천 동면천 정비사업
		진사소하천 정비사업
		황각소하천 정비사업
		만경강 친수시설 유지관리
		만경강 문화관 운영 및 관리
		금강 용안생태습지 유지관리
		하천제방 유지관리
		도로조명 조도개선

1		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 29개노선 L=22.57km, B=8.0-24.0m

◦ 총사업비 : 45,309백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투자	2022년	2023년이후	비 고
45,309	13,874	5,680	25,755

□ 추 진 계 획

◦ 공사중 7개노선	: 2022. 1. ~ 12.

▸시도 1개노선, 농어촌도로 6개노선

◦ 행정절차이행 및 토지보상 중 11개노선	: 2022. 1. ~ 12.

▸시도 1개노선, 군도 2개노선, 농어촌도로 7개노선, 미지정 1개노선

◦ 실시설계 중 9개노선	: 2022. 1. ~ 12.

▸군도 3개노선, 농어촌도로 6개노선

◦ 기본계획 및 타당성조사 용역 중 2개노선	: 2022. 1. ~ 12.

▸시군도 농어촌도로 기본계획 수립용역, 타당성조사 1개노선

□ 기 대 효 과

◦ 농어촌지역 주민의 교통편익과 농수산물의 생산·유통성을 향상시켜 지역경제 활성화 기여

2022년도 노선별 추진 계획

□ 도 로 현 황

구 분	계	시 도	군 도	농어촌도로
노 선 수	1,539	1,264	23	252
연장(km)	1,184	461	201	522
확포장(km)	684	369	118	197
포장률(%)	57.7	80.0	58.7	37.7

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년

◦ 사업개요 : 도로확포장 L=22.57km, B=8.0~24.0m

◦ 총사업비 : 29개사업 / 45,309백만원 (2022년 5,680)

◦ 노선별 추진상황

구 분	도로등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	22예산액	금 후
계		30개노선		L=22.57km B=8.0-24m	45,309	13,874	5,680	25,755
공 사 (7)	시 도 (1)	1268호	어양어곳-부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,100	2,150	-	950	30% 명시
	농어촌 도 로 (6)	춘포103호 (신화선)	춘포토다리-덕동간 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,500	750	750	-	70%
		금마102호 (누부선)	금마누동-신촌간 도로확포장	L=1.01km B=8.0m	930	580	350	-	40%
		황등104호 (황팔선)	황등도선-외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	800	400	200	200	70%
		왕궁207호 (양곡선)	왕궁양동마을 진입도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,380	980	400	-	60% 명시
		금마101호 (서삼선)	금마갈산-서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,829	879	700	1,250	20% 명시
		오산203호 (신수선)	오산역-상아마을간 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	250	200	50	-	60%
보 상 (11)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,780	730	500	2,550	60%
	군 도 (2)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.85km B=24.0m	5,000	1,100	1,000	2,900	36% 사고
		21호	왕궁온수~시대간 (황암~상발)확포장	L=3.00km B=8.0m	2,803	616	-	2,187	57%
	농어촌 도 로 (7)	왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동-군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	-	700	45%
		삼기203호 (석라선)	하나로-소간촌간 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	1,300	600	100	600	57%
		금마202호 (서오선)	금마신정-중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	2,450	600	300	1,550	52%
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,330	130	300	900	11%
		왕궁303호 (사곡선)	왕궁가좌마을 진입로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,116	103	-	1,013	63%
		왕궁302호 (신평선)	왕궁평화촌~평리간 도로확포장	L=1.30km B=8.0m	3,445	180	-	3,265	52%
		춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	100	1,300	0%
	미지정 (1)		황등하동-동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.63km B=8.0m	1,250	500	200	550	40%
실 시 설 계 (9)	군 도 (3)	19호	왕궁신호-용남 위험도로구조개선사업	L=0.50km B=8.0m	486	486	-	-	국비50% 사고
		9호	낭산-시명간 선형개량사업	L=0.40km B=8.0m	1,000	1,000	-	-	국비50% 명시
		7호	성당삼산마을 회전교차로	회전교차로 1식	300	300	-	-	특교세 명시
	농어촌 도 로 (6)	춘포311호 (노적선)	춘포 노적선 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	700	600	-	100	명시 사고
		함라301호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	100	400	1,570	명시
		오산301호 (용연선)	오산 용연선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	900	100	-	800	명시
		삼기208호 (만대선)	삼기만대선 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	신규
		금마303호 (종구선)	금마종구선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,500	-	150	1,350	신규
		망성201호 (신하선)	망성신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	1,000	-	100	900	신규
기 타 (2)			시,군도 도로관리계획 및농어촌도로기본 정비계획수립용역	1식	320	320	-	-	명시
			서부내륙고속도로삼기하이패스 I.C타당성조사용역	1식	70	70	-	-	사고

2		서수~평장간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 3,175억원(국비)

(단위 : 억원)

총사업비	기 투자	2022년	2023년이후	비 고
3,175	40	240	2,895

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 감정평가 및 손실보상(2공구)	: 2022. 1. ~ 12.

◦ 황등지역 집단민원 구간 관계기관 협의(1공구)	: 2022. 1. ~ 3.

◦ 편입토지 보상계획열람 공고(1공구)	: 2022. 4. ~ 5.

◦ 편입토지 감정평가 및 손실보상(1공구)	: 2022. 6. ~

◦ 공사 준공	: 2028. 5.

□ 기 대 효 과

◦ 국도대체 우회도로개설에 따른 교통정체 및 혼잡구간 해소 및 도심

지역 원활한 교통소통 도모

◦ 호남고속도로와 서해안 고속도로 연결로 지역 균형발전 및 간선도로망

확충으로 광역 교통물류 체계 구축

3		오산 신지~영만간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 신지리~영만리(국도23호~국도21호)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2030. 12.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=7.05km, B=20.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 1,888억원(국비)

(단위 : 억원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후	비 고
1,888	2	26	1,860

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

□ 추 진 계 획

◦ 기본 및 실시설계용역	: 2022. 1. ~ 2023. 6.

◦	편입토지 보상 및 공사 발주	: 2023. 7. ~

◦	공사 준공	: 2030. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 새만금 개발에 다른 연계 도로망의 확충으로 물류비용 절감 및 지역

균형 발전 기여

◦ 황등~오산간 국도대체 우회도로와 국도 21호선의 연결은 통해 기존

도로의 효율성 증대 기여

4		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2023. 11.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9km, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원 (국 10,093 도 23,065 시 14,210)

(단위 : 백만원)

공구별	총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후
계	47,368	32,696	6,000	8,672
1지구	24,693	23,693	1,000	-
2지구	22,675	9,003	5,000	8,672

▸2022년 예산액 : 6,000백만원 (도 4,200 시 1,800)

□ 추 진 계 획

◦ 왕궁천(1·2지구) 공사 완료	: 2022. 12.

≪1지구≫ 익산천합류점 ~ 흥암교까지 L=4.62㎞

- 제방축제 및 보축, 노후교량 재가설 5개소 등	: 2022. 2. ~ 7.

(전체공정율 60%, 2021. 12월 기준)

≪2지구≫ 흥암교 ~ 보석박물관 L=4.63㎞,

- 제방축제 및 보축 , 노후교량 재가설 4개소 등	: 2022. 2. ~ 2023. 11.

(전체공정율 40%, 2021. 12월 기준)

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

5		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축(L=6.1㎞), 교량 재가설(7개소), 둑마루포장(콘크리트 L=6.1㎞, B=4.0m) 등

◦ 총사업비 : 15,489백만원(국 1,000 도 9,842 시 4,647)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후
15,489	4,659	3,000	7,839

▸2022년 예산액 : 3,000백만원 (도 2,100 시 900)

□ 추 진 계 획

◦ 총사업비 협의 완료	: 2022.  1.

◦ 건설사업관리용역 발주(공사감리)	: 2022.  1.

◦ 하천공사 시행계획 고시	: 2022.  2.

◦ 장기계속공사 총괄발주 및 업체선정              : 2022.  2. ~  3.

◦ 공사추진(1차분)                                 : 2022.  4. ~ 12.

◦ 공사완료	: 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

6		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.687㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6㎞, 교량 재가설 6개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,066)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년 이후
1,500	200	1,300	0

▸2022년 예산액 : 1,300백만원 (시비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 주민설명회 2차 개최	: 2022. 2.

◦ 설계검토(전라북도)	: 2022. 3.

◦ 실시설계 완료	: 2022. 4.

◦ 편입토지 감정평가 및 협의보상	: 2022. 4. ~

◦ 공사 착공	: 2022. 6.

◦ 공사 완료	: 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

7		황각소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 신용리 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.753㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축, 교량 재가설 등

◦ 총사업비 : 2,000백만원(설계 150, 보상 350, 공사 1,500)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년 이후
2,000	0	200	1,800

▸2022년 예산액 : 200백만원 (시비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 및 토질조사 용역	:  2022. 1. ~ 9.

◦ 편입토지 감정평가 및 협의보상	:  2022. 10. ~ 12.

◦ 공사 추진                                  :  2023. 1. ~ 2024. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

8		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=28km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 주요시설 : 6개지구 (익산지방국토관리청시행)

구 분	친수시설물	인계·인수
신지지구	자전거도로 5.42km, 친수공간 등	2016. 12.
목천지구	자전거도로 2.32km, 파크골프장 등	2016. 12.
춘포지구	자전거도로 4.0km, 축구장, 수변공원 등	2017. 01.
화전지구	자전거도로 1.3km, 구담교, 친수공간 등	2019. 01.
반월지구	자전거도로 2.8km, 축구, 야구, 족구, 농구, 인라인장 등	2021. 03.
마산지구	자전거도로 5.87km, 친수공간 등	2021. 03.

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 764백만원 (국 428 시 336)

(단위 : 백만원)

재원별	세 부 사 업 내 용	2022예산액
	합 계	764
국 비	만경강 친수시설물 유지관리	428
시 비	반월지구 그늘막 설치, 태양광 가로등설치 등	316
	만경강 야외수영장 타당성 및 기본계획 구상 용역	20

◦ 주요내용 : 친수시설관리, 제방도로 및 자전거도로 제초, 시설물보수 등

□ 추 진 계 획

◦ 친수시설 유지관리	: 연  중

□ 기 대 효 과

◦ 친수시설 유지보수를 통하여 안전하고 쾌적한 하천환경 조성 기여

9		만경강 문화관 운영 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 186백만원(시비)

◦ 시설규모 : 부지면적 13,814㎡ (지상2층 지하1층, 연면적 1,686㎡)

생태전시관, 체험관, 다목적실, 카페테리아, 야외광장 등

◦ 주요내용 : 만경강 문화관 운영 및 시설물 유지관리

(단위 : 백만원)

세 부 사 업 내 용	2022예산액
합 계	186
운영 및 관리비	58
시간선택제임기제 (다급 1명), 기간제근로자(4명) 인건비	128

□ 추 진 계 획

◦ 만경강 문화관 시간선택제임기제 채용	: 2022. 1.

◦ 만경강 문화관 시설물 인수인계	: 2022. 1.

(환경부 전북지방환경청장 □ 익산시장)

◦ 만경강 문화관 운영 및 관리	: 연  중

□ 기 대 효 과

◦ 만경강 문화관의 새로운 볼거리 제공 및 익산시 랜드마크로 조성하여 만경강의 관광활성화에 기여

10		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 전망데크 제방연결로포장, 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초
노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 1,177백만원 (국 782 시 395)

(단위 : 백만원)

재원별	세 부 사 업 내 용	2022예산액
	합 계	1,177
국 비	용안생태습지 시설물 유지관리	658
	하천 환경정비 기간제(감시원 1명), 기간제근로자(30명)	124
시 비	전망데크 안전난간, 태양광 보안등 설치 등	395

□ 추 진 계 획

◦ 보수·보강시설물 실시설계용역	: 2022. 1. ~ 2.

◦ 환경부 금강유역환경청 하천점용허가 협의	: 2022. 3.

◦ 관광활성화를 위한 조경시설 보강	: 2022. 4. ~ 7.

◦ 생태습지 유지관리	: 연 중

□ 기 대 효 과

◦ 용안생태습지 기반시설 및 편의시설 기능을 보강하여 관광활성화 기여

11		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 집중호우대비 시설물보수, 하상준설, 지장물제거, 제방 및 호안 제초, 예초 등

◦ 총사업비 : 1,568백만원(시비 1,568)

(단위 : 백만원)

구 분	단 위 사 업 별	2022예산액	주 요 내 용
	합 계	1,568
준설	어량천 하천준설공사	100	하상준설 및 수목제거
	필동천 하천준설공사	50
	목천동 목천포천 하천준설공사	50
	대조천 하천준설공사	100
	춘포면 익산천 하천준설공사	50
	성당면 외두천 하천준설공사	60
	금마면 외산천 하천준설공사	50
	탑천 하천준설공사	150
	은기동 중앙마을 소하천 준설	19
제방보수 및 보강	소하천 유지보수	500	21년 응급복구 및 22년 호우피해 대비 등
	덕기동 익산천 제방보수공사	100
	도천마을 교량연석 보수 및 확장	7
둑마루 제방포장	여산면 강경천 제방포장공사	50	제방(둑마루) 콘크리트 포장 등
	죽청천 제방포장공사	220
제초	석왕천 제방 제초	10	제방 제초작업 및 수목제거
안전점검	오산제 등 9개소 정기안전점검용역	12	제방 및 배수문에 구조적 안전성 및 손상상태 점검
	원수우안1지구 외 6개소 정밀 안전점검 용역	40

□ 추 진 계 획

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리	: 연  중

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우 등 자연재해시 하천으로 인한 피해를 사전에 예방하고 이를 통하여 안전한 하천시설 및 쾌적한 하천환경 조성 기여

12		도로조명 조도 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 생활환경개선 보안등 설치 외 11개사업

◦ 총사업비 : 1,596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산	비 고
합 계		12개 사업	1,596
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등 신규설치 1식	191
노후 가로등 정비	도심지역 가로등 유지보수	가로등 보수단가 1식	130
	산업단지 가로등 유지보수	가로등 보수단가 1식	40
	읍면지역 보안등 보수	보안등 보수단가 1식	120
	동지역 보안등 보수	보안등 보수단가 1식	90
	전기안전점검부적합보수단가	부적합 보수단가 1식	30
	노후 보안등기구 교체	보안등 교체 및 정비 1식	42
	가로등 노후 점멸기 교체공사	점멸기 교체 및 정비 1식	23
	도심지역노후가로등교체공사	노후가로등정비 1식	100
	노후가로등LED교체공사	LED등기구교체 1식	100
	산업단지조도개선공사	등기구 교체 및 정비 1식	80
	영등동 가로환경 가로등 정비사업	가로등 교체 및 정비 1식	650

□ 추 진 계 획

◦ 가로등․보안등 유지관리(보수단가 계약)	: 2022.  1. ~ 12.

◦ 가로등․보안등 정비공사 추진	: 2022.  1. ~ 12.

◦ 보안등 신규설치 현장조사 및 사업추진	: 2022.  2. ~  6.

◦ 사업완료	: 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도로조명 시설의 신규설치 및 정비를 통해 안전사고를 예방하고 야간통행 환경을 개선함으로써 안전한 밤거리 조성 기여