2022. 1.

제240회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 계획

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 주요성과 및 반성
□	2022 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 ‘多e로움 water’공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 스마트 미터 사업을 통한 유수율 제고 및 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	7	15	10	6	2
현 원	41	1	1	12	18	3	4	2	실무수습1
증 감	△1			5	3	△7	△2

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원					임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민 단체	기관
10	2	1	2	4	1	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	278,496	276,847	99.4
도심권	221,446	221,224	99.9
읍면권	57,050	55,623	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	149,303
생 활 용 수	소 계	195,300	128,212	100%
	광 역	105,300	65,533	51%
	자 체	90,000	62,679	49%
공 업 용 수	자 체	35,000	21,091

□ 상수도 사용 현황

‘21. 12. 부과분 기준(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,190	3,404,828	100.0
가 정 용	48,595	1,708,416	50.2
일 반 용	14,737	557,981	16.4
대 중 탕 용	40	13,021	0.4
산 업 용	721	436,222	12.8
전용공업용	97	689,188	20.2

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,899.8	2.5	25.3	1,185.9	686.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2021 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

▸노후상수도 정비사업 : 실시설계용역 추진(공정률 60%, 블록고립 확인 61개소)

▸스마트 지방상수도 지원사업 : 물품구입 및 시설공사 조기 착공

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

▸상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 3개소 0.8km/675개소

▸관내 변류정비 및 교체 : 78개소

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

▸‘21년 부과/징수 : 24,706백만원/24,488백만원(징수율 99.1%)

▸노후·동파·고장 수도계량기 교체 : 1,266전

◦ 수도요금 감면 실시로 코로나 19로 인한 시민부담 해소

▸기초생활수급자 및 다자녀 등 : 101,861건, 243,932천원

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸급수구역 확장공사 : 8개소 2.46km / 급 □ 배수관 개선공사 : 475개소 9.0km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸급수장치 수선 공사 3,312건, 수용가 옥내누수 탐사 1,144건

▸상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 35개소 8.8km

▸누수처 신고 포상금제 운영으로 신속 복구 : 16개소/155,000원

□ 반      성

◦ 상수도 특별회계 경영악화 및 현실화율 감소

▸코로나 19 확산으로 상수도 요금 현실화 추진 유보

‣연도별 현실화율 현황(2018년 75.05%, 2019년 72.40% 2020년 71.41%)

		지방상수도현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축> 상수도관망 기술진단용역 금마배수지 확충공사 급수구역 확장 및 급·배수관 개선공사 상수도 요금 부과·징수 깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 관리 금강정수장 차염설비 설치공사 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

2022 주요업무계획

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사 업 비 : 58,376백만원

▸노후상수도 정비사업 : 55,733백만원(국비 50%, 도 10%, 시 40%)

- 2022년 사업비: 15,125백만원(2020년 8,360, 2021년 12,080)

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 2,643백만원(국비 70%, 시 30%)

◦ 사업내용

▸노후관교체(L=148km) 및 블록시스템구축(61개소)

▸정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 유량수압 감시 시스템 등

□ 추 진 계 획

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역 추진	: 2020. 1. ~ 2022. 9.

- 실시설계용역 완료 및 환경부 승인

▸블록시스템 구축공사 추진	: 2022. 1. ~ 12.

- 우선사업대상지 블록구축공사 발주 및 착공

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸단계별 물품구입 및 공사 착공 및 준공	: 2022. 1. ~ 12.

- 1단계(스마트관로인식체계 등), 2단계(정밀여과장치 등), 3단계(관세척 등)

□ 기 대 효 과

◦ 노후 상수관망 현대화 시설 구축으로 유수율 제고 및 맑은 물 공급

◦ 실시간 수질·수량 사고 감시 및 수질 이상시 오염수 자동배출 등 신속 대응

2		상수도관망 기술진단용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 용 역 비 : 300백만원

◦ 용역내용 : 상수도관 L=1,599km 기술진단 1식

◦ 관계법령

▸수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등), 동법 시행규칙 제27조(수도시설에 대한 기술진단의 구분)에 의한 법적 의무사항(5년마다 시행)

- 최근 용역 완료 : 2016. 11. 15.(용역비 1,085백만원)

※현재 진행중인『지방상수도 현대화사업』현장조사 자료를 활용하여 용역비 절감

□ 추 진 계 획

◦ 상수도관망 기술진단용역 추진	: 2022. 1. ~ 12.

▸용역 발주(2월) 및 착공(3월), 준공(12월)

◦ 상수도관망 기술진단용역 환경부 협의 및 승인	: 2022. 7. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 상수도 관망시설에 대한 기술진단을 실시하여 기능 저하요인을 분석하고 기술진단 결과에 따라 시설을 개선

◦ 상수도 관망 기술진단을 통하여 수압의 적정성 및 수질의 안전성 등을 확보하여 안정적이고 위생적인 생활용수 공급

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 산 33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ～ 2023. 12.(3개년)

◦ 사 업 비 : 8,010백만원(균특 5,900백만원, 시비 2,110백만원)

▸2022년 사업비 : 1,086백만원(도비 760, 시비 326백만원)

◦ 사업내용 :  금마배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

▸2021년 사업내용 : 실시계획승인 및 설계심의

▸2022년 사업내용 : 원가심사 및 배수지 토공 및 기초공사

□ 추 진 계 획

◦ 금마배수지 확충공사 실시계획인가 및 설계심의 완료	: 2022. 01.

◦ 금마배수지 확충공사 원가심사(전북도) 및 공사발주	: 2022. 02.

◦ 금마배수지 확충공사 공사 2022년분 준공	: 2022. 12.

◦ 금마배수지 확충공사 공사 준공	: 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 금마배수지 유효용량 확보로 안정적인 체류시간 확보

◦ 낭산 급수분구인 낭산면, 황등면, 금마면, 여산면 일원에 비상시에도 안정적인 생활용수 공급으로 시민불편 해소

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			2,220
급수구역 확장공사	함라면 신대마을 외 3개소	배수관부설 L=2,850m	670
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	40개소, 8.0km	600
급·배수관 개선공사	익산시 일원	475개소, 9km	950

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장공사	: 2022. 1. ~ 10.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~9월)

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사	: 2022. 2. ~ 9.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~9월)

◦ 급․배수관 개선공사	: 2022. 1. ~ 12.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

□ 기 대 효 과

◦ 급 □ 배수관 신설 및 확장으로 수돗물 공급 최적화

◦ 상수도 부설 후 노면불량 도로의 개선으로 안전사고 예방

5		상수도 요금 부과 ․ 징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 소요예산 : 748백만원(조사원 관리 637, 전산실 운영 111)

◦ 2022년도 부과․징수예정액 : 27,813백만원      (단위:백만원, ‘21.12.28기준)

합계(A+B)	현년도 부과예정액(A)	과년도 체납액(B)	비고
27,813	26,938	875	2021년 체납액 : 218 2020년 이전 체납액 : 657

※ 급수전수 : 64,190전(가정용 48,595전, 일반용 14,737전, 대중탕용 40전, 산업용 721전, 전용공업용 97전)

□ 추 진 계 획

◦ 정확한 사용량 조사를 위한 수도 계량기 조사원 관리

▸조사원 : 39명(통․리장 10명, 일반 29명)

▸친절․직무교육과 워크숍 : 교육(월 1회) / 워크숍(연 1회)

▸계량기 조사원 담당구역 상수도 요금 징수 책임제 시행

◦ 상수도 체납사용료 고액상습 체납자 징수반 편성․운영 : 2개반

▸30만원 이상, 3회이상 체납자에 대한 강력한 체납징수 : 수시

- 전화․방문 납부독려와 단수, 부동산 및 자동차에 대한 재산 압류

※기초생활수급자 등 사회적 약자와 혹한기 단수유예로 시민불편 최소화

◦ 상수도 요금 체계 개선 및 현실화 추진

▸조례개정 추진 및 대시민 홍보	: 2022. 7. ~

▸상수도 요금인상 시행	: 2023. 1. ~

□ 기 대 효 과

◦ 정확한 사용량 조사 및 요금부과로 신뢰받는 상수행정 구현

◦ 강력한 징수활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

6		깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사업대상 : 11개소(정수장 2, 배수지 7, 가압장 2)

◦ 사 업 비 : 545백만원

◦ 사업내용

▸배수지‧침전지 및 여과지 청소	: 8건 / 138백만원

▸정수장 여과지 이중문 및 에어커튼 설치공사	: 1건 /  20백만원

▸정수시설물 정밀점검 용역	: 1건 /  72백만원

▸정수시설물 전기설비 유지보수	: 4건 / 105백만원

▸정수시설물 기계설비 유지보수	: 5건 / 150백만원

▸상수도 정·배수지 예초작업	: 2건 /  60백만원

□ 추 진 계 획

◦ 현장조사 및 설계	: 2022. 1. ~  3.

◦ 발주 및 착공	: 2022. 2. ~  5.

◦ 공사준공	: 2022. 3. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 정수시설물의 정기적 보수·보강으로 안전 사고 미연 방지

◦ 체계적인 시설물 개량으로 고품질 수돗물의 안정적인 공급

7		금강정수장 차염설비 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강정수장 염소소독동

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10.

◦ 사 업 비 : 538백만원

◦ 사업대상 : 금강정수장 소독설비

◦ 사업내용

▸차염설비 1식, 건축동 1동, 기존 액화염소동 철거 1식

□ 추 진 계 획

◦ 자료수집 및 현장조사 실시	: 2022. 1.

◦ 대체소독설비 실시설계	: 2022. 1.

◦ 발주 및 착공	: 2022. 3.

◦ 대체소독설비 시험운영	: 2022. 9. ~ 10.

◦ 기존 액화염소 시설 철거	: 2022. 10.

◦ 준공 및 정상운영	: 2022. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 금강정수장 주변 대규모 주거지 밀집에 대한 독성가스 누출 불안감 해소

◦ 고품질 수돗물에 대한 시민요구 증대 및 안전성 확보

◦ 화학물질관리법 개정에 따른 제약과 관리 어려움 해소

8		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 확보를 위한 주민 홍보 강화

□ 추 진 계 획

◦ 원․정수 목표 수질 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정 수질검사 기준	자체 수질검사 계획
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 8개 분 기 : 질산성질소 등 30개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 월 간 : 수소이온농도 등 9개 분 기 : 질산성질소 등 31개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시 : 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 신흥․금강정수장 수질자동 측정장치 정도검사 실시 : 12,000천원(24대)

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부 : 10,000천원 (50,000부)

◦ 수질검사결과 홍보강화 : 홈페이지 및 내고장소식지 등

□ 기 대 효 과

◦ 원‧정수에 대한 철저한 수질관리로 시민이 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보