2022. 1.

제240회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 주 요 성 과 및 반성
□	2022 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	6	6	7	4
현 원	24	1	7	7	2	7
증 감			1	1	▵5	3

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2021. 12.	비 고
시설	총인구	천명	282
	하수인구	천명	270
	보급률	%	95.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	119,381
	1일평균하수처리량	톤	116,090
	하수처리율	%	97.2
하수도 사용	개소수	전	40,458
	톤당 평균요금	원	680.38

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	준공일자	비 고
계	30	150,110㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	1995.07	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	2004.09	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	2008.06	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	2008.06	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	2009.12	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	2010.05	민간위탁 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	22	1,760㎥/일	1995~2017	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	2014.07	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	2019.12	〃

2021 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 환경기초시설 악취개선사업 국고보조사업 선정에 따른 국 · 도비 확보

‣익산공공하수처리시설 외 7개소 악취개선사업 추진

- 총사업비 7,995백만원(국비 4,320, 도비 1,838 시비 1,837)

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 남부2·3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 추진(공정율 75%)

- 관로정비 27.7km, 배수설비 1,918개소

‣ 남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업 사업발주 및 착공

- 현장 조사(야적장, 사토장, 관로 8.7km, 배수설비 136개소)

‣ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 추진(공정율 89%)

- 설계경제성 및 안정성 검토, 공법 선정, 기술자문 완료

‣ 함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사(오수신설 0.57km, 배수설비 54개소)

‣ 하수시설 민원처리 배수설비 공사 32건 처리 완료

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣ 익산공공하수처리시설 및 금강분뇨처리장 악취기술진단 실시

‣ 여산처리장 외 15개소 기능보강공사 및 여산하수 기술진단 실시

‣ 익산공공하수찌꺼기 감량화사업 탈취기 신설 및 악취대책 추진

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 소규모 공사 146건 처리 및 생활민원처리 295건 처리

‣ 생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 3,231건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 추진 시 행정절차(설계경제성 검토, 기술자문, 재원협의 등) 지연으로 공사 미착공

		남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 금마공공하수처리시설 증설 하수찌꺼기 감량화 사업 환경기초시설 악취개선 사업 공공하수처리시설 운영관리 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 영등지구 노하하수관로 정비사업 송학동 우수박스 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

2022 주요업무계획

1		남부2⦁3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2019. 05. ~ 2022. 09.

◦ 사업내용 : 오수관로 정비 L=30.5km, 배수설비 2,646가구

◦ 총사업비 : 36,490백만원(국비  25,543 도비  1,094 시비  9,853)

※ 2022년 사업비: 9,331백만원(국비 7,073 도비 304 시비 1,954)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022	비고
합계(100%)	36,490	14,843	1,447	10,869	9,331
국비( 70%)	25,543	9,830	1,013	7,627	7,073
도비( 3%)	1,094	420	43	327	304
시비( 27%)	9,853	4,593	391	2,915	1,954

□ 추 진 실 적

◦ 공 정 율 : 75% (관로 27.7km, 배수설비 1,918가구)

▸1차분 및 2차분 공사준공            : 2020. 05. 27. / 2020. 12. 21.

- 오수관로 정비 21.8km, 배수설비 939가구

▸3차분 공사시행                     : 2021. 01. 12. ~ 2022. 01. 11.

- 오수관로 정비 5.9km, 배수설비 979가구

□ 추 진 계 획

◦ 잔여구간 공사 추진	: 2022. 01. ~ 09.

▸오수관로 정비 2.8km, 배수설비 728가구

▸신용동, 동산동, 금강동, 영등1동, 평화동 일원

◦ 보조사업 정산보고(전북지방환경청)	: 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 생활환경개선 및 만경강수계 수질개선과 공공하수처리시설의 운영효율 제고

2		남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구, 맨홀펌프장 9개소, 자가펌프장 11개소

◦ 총사업비 : 37,386백만원(국비  13,559 도비 2,382 시비  21,445)

※ 2022년 사업비: 974백만원(국비 655 도비 65 시비 254)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020이전	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	37,386	1,321	2,604	974	8,716	23,771
국비( 36%)	13,559	642	1,366	655	4,358	6,538
도비( 6%)	2,382	64	136	65	436	1,681
시비( 58%)	21,445	615	1,102	254	3,922	15,552

□ 추 진 실 적

◦ 전북지방환경청 재원협의 완료(180억→373억 총사업비 증액)	: 2021. 05.

◦ 시설공사 착공(1차분)	: 2021. 09. 29.

▸공사기간 : [전체분] 2021.09.29.~2024.09.28. [1차분] 2021.09.29.~2022.09.28.

▸공정률 : 5%  ※ 현장 조사(야적장, 사토장, 관로 8.7km, 배수설비 136개소)

□ 추 진 계 획

◦ 시설공사 1차분 준공	: 2022. 09.

◦ 시설공사 2차분 착공	: 2022. 09.

※ 장기 계속사업으로 2024. 12월 준공 예정

□ 기 대 효 과

◦ 분류식 하수관로 정비를 통해 남부지역 하수관로 통수능력을 개선하여 분뇨처리 비용 절감 및 도시미관 개선

3		북부1처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=35.6km, 배수설비 2,648가구

◦ 총사업비 : 41,607백만원 (국비 29,125 도비 1,248 시비 11,234)

※ 2022년 사업비: 3,028백만원(국비 2,585 도비 111 시비 332)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	41,607	714	1,153	3,028	14,303	22,409
국비( 70%)	29,125	500	1,010	2,585	10,012	15,018
도비( 3%)	1,248	21	43	111	429	644
시비( 27%)	11,234	193	100	332	3,862	6,747

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 일시중지	: 2021. 05. 10.

▸건설공사 필수 행정절차 이행(설계경제성 검토용역, 기술심의, 재원협의 등)

◦ 행정절차 이행	: 2021. 08. ~12.

▸설계 경제성검토, 설계 안정성검토, 보수공법 선정, 기술자문 심의

□ 추 진 계 획

◦ 환경부 재원협의	: 2022. 01.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 발주	: 2022. 03.

◦ 시설공사 및 건설사업관리용역 착공 및 시행(1차분)	: 2022. 04. ~ 12.

※ 장기 계속사업으로 2024. 12월 준공 예정

□ 기 대 효 과

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 개인정화조 등에서 발생되는 악취발생 원인 제거 및 만경강수계 수질개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성

4		금마공공하수처리시설 증설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 동고도리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 하수처리시설 증설 Q=1,100㎥ ⇒ 1,600㎥

◦ 총사업비 : 7,160백만원 (국비 5,012 도비 214 시비 1,934)

※ 2022년 사업비: 785백만원(국비 629 도비 135 시비 21)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021	2022	2023	비고
합계(100%)	7,160	429	785	5,946
국비( 70%)	5,012	300	629	4,083
도비( 3%)	214	65	135	14
시비( 27%)	1,934	64	21	1,849

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 원가심사 완료	: 2021. 06. ~ 07.

◦ 조달청 발주 의뢰	: 2021. 07. 28.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수	: 2021. 10. 15.

▸용역기간 : 2021. 10. 22. ~ 2022. 10. 21.

□ 추 진 계 획

◦ 행정절차 이행(공법선정, 재원협의 등)	: 2022. 06.

◦ 시설공사 발주 및 착공	: 2022. 09.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2022. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 익산시 금마면 일대 개발여건 변화 및 하수처리구역 확대에 따른 공공하수처리시설 증설로 오염원 정화 및 주거환경 개선

5		하수찌꺼기 감량화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 10.

◦ 사업내용

▸소화조개선 4기(10,000㎥) 및 신설 2기(6,692㎥) : 가온방식변경, 교반기 신설

▸탈취시설, 가스저장조 및 탈황설비 노후로 인한 교체

▸협잡물처리기, 농축시설 및 저류조 운영방식 개선

▸반류수 처리시설(1,790㎥) 신설

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비 18,791 도비 4,027 시비 3,285 기금 741)

※ 2022년 사업비 : 300백만원(시비)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022	비고
합계(100%)	26,844	3,688	13,293	9,563	300
국비( 70%)	18,791	2,372	9,305	7,114	0
도비( 15%)	4,027	509	1,994	1,524	0
시비( 15%)	4,026	807	1,994	925	300

□ 추 진 실 적

◦ 시설공사(토목·건축·기계) 3차분 착공	: 2021. 02. 25.

◦ 건설사업관리용역 3차분 착공	: 2021. 02. 26.

◦ 전기계측공사 3차분 준공	: 2021. 04. 30.

◦ 소화조 준설폐기물 소각처리 용역 준공	: 2021. 06. 22.

◦ 전기계측공사 4차분 및 전기소방공사 2차분 착공	: 2021. 06. 30.

※ 전체 공정율: 56%

□ 추 진 계 획

◦ 공사 준공	: 2022. 06.

◦ 시운전 착수	(소화조 2개소, 탈취시설, 반류수 처리시설 등)  : 2022. 07. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 소화가스 관련 설비 및 탈취시설 보강으로 악취발생 원천 차단

◦ 하수찌꺼기 발생량을 줄여 위탁처리비 절감과 가스 판매 수익 창출

6		환경기초시설 악취개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 총 8개소(익산, 분뇨, 북부, 함열, 금마, 여산, 1중계 및 2중계 펌프장)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 악취방지시설 신규 설치 및 용량 재구성 등

◦ 총사업비 : 7,995백만원(국비 4,320 도비 1,838 시비 1,837)

※ 2022년 사업비 : 834백만원(국비 500, 도비 167, 시비 167)

□ 추 진 실 적

◦ 북부·금마·함열·여산공공하수 악취기술진단 실시	: 2020. 02.~06.

◦ 익산·분뇨처리시설 악취기술진단 실시	: 2020. 10.~12.

◦ 2022년 환경부 국고보조사업 확정내시 통보	: 2021. 12. 21.

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 용역 도 원가심사	: 2022. 02.

◦ 실시설계 용역 시행	: 2022. 03. ~ 08.

◦ 악취방지시설 설치공사 시행	: 2022. 09. ~ 2024. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 악취저감시설 설치를 통해 공기 중 악취확산을 최소화함으로써 강화되는 악취 배출허용기준에 대응하고, 악취발생을 근원적으로 제거함으로써 주거 생활환경 개선

7		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소, 중계펌프장 17개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

※ 2022년 BTO위탁운영비: 14,349백만원(도비 590백만원 시비 13,759백만원)

□ 추 진 실 적

◦ 악취기술진단 완료시설 운영관리 평가 수상	: 2021. 11.

▸ 함열공공하수 최우수 개선시설 선정(한국환경공단 주최)

◦ 익산공공하수 3중계펌프장 탈취설비 개선공사 외 3건 완료 : 2021.1~12.

□ 추 진 계 획

◦ 익산 외 4개소 공공하수처리시설 수질관리(6개항목, 일1회)	: 연중

◦ 익산 외 3개소 수질TMS 정도검사	: 연중

◦ 익산 외 3개소 정기 점검(환경청)	: 연중

◦ 하수찌꺼기 성분 검사(연2회)	: 상·하반기

◦ 익산 외 4개소 분기별 복합악취농도 검사	: 분기별

◦ 익산공공하수(BTO) 운영관리 실태평가(환경청)	: 2022. 05. ~ 06.

□ 기 대 효 과

◦ 하수처리 기술과 노하우를 가진 전문 업체의 위탁운영으로 방류수 수질기준을 철저히 준수하고, 시민이 체감하는 양질의 하수도 서비스 제공

8		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 25개소(여산 1, 소규모 22, 제3산업단지 1, 국가식품클러스터 1)

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,760	85개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), (유)대신환경개발 2020.~2022.]

※ 2022년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비: 3,021백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 소규모하수 기술진단 완료(오산, 왕궁상발, 춘포초삼)	: 2021. 04. ~ 07.

◦ 3산단 폐수 악취기술진단 완료                      : 2021. 09. ~ 12.

◦ 3산단 탈수기 보수 외 16개 보수공사 실시	: 2021. 01. ~ 12.

□ 추 진 계 획

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리

▸공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 운영(주 4~5회 수시점검)

▸처리시설 용량별 수질검사 6개 항목

- 500톤/일 이상 3개소 일 1회, 50~500톤/일 12개소 주 1회, 50톤/일 미만 10개소 월 1회 수질검사

◦ 제3산단 및 국가식품폐수 운영관리 실태평가	: 2022. 07.

◦ 제3산단 및 국가식품폐수, 여산하수 복합악취측정	: 분기별

□ 기 대 효 과

◦ 관리대행 업체에 위탁운영 함으로써 전문적인 운영관리 및 시설의 효율적 운영․방류수질 기준 확보

9		익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.63km

※ 평화동(1,250m), 송학동(910m), 모현동(470m)

◦ 총사업비 : 12,109백만원(국비 6,054.5 도비 605 시비 5,449.5)

※ 2022년 사업비: 1,241백만원(국비 1,041 도비 104 시비 96(미확보 841))

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021	2022	2023 이후	비고
합계(100%)	12,109	1,000	1,241	9,861
국비( 50%)	6,055	500	1,041	4,514
도비( 5%)	605	50	104	451
시비( 45%)	5,449	450	96	4,896

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 03.

◦ 실시설계비 220백만원 예산 반영(3회추경)	: 2020. 07.

◦ 2021년 국고보조사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 사업추진 공법 결정(비굴착 전체보수, 부분보수 등)	: 2022. 02.

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2022. 05.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2022. 07. ~ 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 노후 우수박스정비를 통해 하수배제 기능을 개선하고, 침수피해·싱크홀 등의 안전사고 예방

10		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 15,077백만원(국비 7,539 도비 754 시비 6,784)

※ 2022년 사업비: 1,014백만원(국비 851 도비 85 시비 78(미확보 688))

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022	2023 이후	비고
합계(100%)	15,077	186	1,000	3,031	1,014	9,158
국비( 50%)	7,539	0	500	2,500	851	3,688
도비( 5%)	754	0	50	250	85	369
시비( 45%)	6,784	186	450	281	78	5,789

□ 추 진 실 적

◦ 국가산업단지 하수관로 기술진단 실시	: 2019. 04.

◦ 설계경제성(VE) 용역 및 기술자문위원회 완료	: 2020. 09.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2020. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2022. 02.

◦ 전라북도 원가심사 완료	: 2022. 03.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2022. 05. ~ 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 40년 이상 경과한 국가산업단지 내 노후하수관로 교체·보수를 통해 지하수 오염, 침수피해 및 지반침하 등의 안전사고를 예방하고, 하수배제 기능을 개선하여 공공하수처리시설의 효율성 향상

11		영등지구 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동(5,854m), 마동(1,060m), 남중동(286m) 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 노후하수관로정비 L=7.2km

◦ 총사업비 : 11,000백만원(국비 5,500 도비 550 시비 4,950)

※ 2022년 사업비: 550백만원(국비 500 도비 50 시비 미확보(450))

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022	2023 이후	비고
합계(100%)	11,000	550	10,450
국비( 50%)	5,500	500	5,000
도비( 5%)	550	50	500
시비( 45%)	4,950	0	4,950

□ 추 진 실 적

◦ 2022년 환경부 신규 국고보조사업 확정	: 2021. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 02.

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2022. 09.

◦ 공사착수	: 2022. 11.

□ 기 대 효 과

◦ 영등제2택지지구, 마동, 남중동 일원의 노후하수관로 정비를 통해 하수배제 기능을 개선하고, 침수피해·싱크홀 등의 안전사고 예방

12		송학동 우수박스 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-7번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용 : 2.0m×1.5m 우수박스 설치(L=380m)

※ 기존 시설물 현황 : 1.5m×1.0m~1.5m×1.2m

◦ 총사업비 : 1,300백만원(특교세 1,000 시비 300)

※ 2022년 사업비: 1,000백만원(특교세 1,000 시비 미확보(300))

□ 추 진 실 적

◦ 2021년 하반기 특별교부세 사업 신청	: 2021. 09.

◦ 2021년 특별교부세 확정	: 2021. 12.

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 용역 착수 및 완료	: 2022. 01. ~ 03.

◦ 공사 착공	: 2022. 04.

◦ 공사 준공	: 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면이 부족한 송학동 일원에 우수박스 정비를 통해 집중호우 시 해당 지역의 침수 피해 방지 및 원활한 우수배제 확보

13		소규모 하수도 시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사 업 비 : 1,991백만원 (시비)

◦ 사업내용	:  76건 / 1,991백만원

▸소규모 하수도시설 정비공사	:  25건 / 800백만원        ▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	:  26건  / 191백만원

- 함열읍 동지하마을 하수도 정비공사 외 25건

▸하수관로 기계준설	:  25건 / 1,000백만원

□ 추 진 계 획

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸상반기 공사 발주 15건/500백만원	: 2022. 01. ~ 2022. 06.

▸하반기 공사 발주 10건/300백만원	: 2022. 07. ~ 2022. 12.

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)

▸상반기 공사 완료 26건/191백만원	: 2022. 01. ~ 2022. 06.

◦ 하수관로 기계준설

▸상반기 공사 발주 15건/600백만원	: 2022. 01. ~ 2022. 06.

▸하반기 공사 발주 10건/400백만원	: 2022. 07. ~ 2022. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 슬러지 적체, 배수불량 등 하수의 흐름을 방해하는 요소를 사전에 제거하고, 시민 맞춤형 소규모 생활환경개선사업을 통하여 쾌적한 정주여건 조성