2022.  7.

제244회 익산시의회(임시회)

― 2022 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 상반기 성과 및 반성
□	2022 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	4	9	4	4
현 원	22 (정원외 1)		1	7	6 (정원외 1)	4	4
증 감	-		-	3	△3	-	-

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업, 철도건널목개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등 업무지원
	◦	하천시설	:	하천기본계획수립, 지방하천환경정비사업, 소하천정비사업
	◦	하천관리	:	하천유지관리(국가,지방,소하천), 용안생태습지유지관리 만경강 친수시설 유지관리, 하천점용허가 및 골재채취허가
	◦	가로등관리	:	가로등·보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 가로등·보안등 관련 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	155.797	167.836	48%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	29.187	73.016	29%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
605	428	32	145	2,984,418.19	232,614	1,341,573	1,410,231

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,350	19,538	10,812

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	94버6749 더블캡 1대, 오토바이 1대

2022 예산집행실적

【 2022. 6. 15. 현재 】                                     (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				37,990,942	11,493,163	26,497,779	30.3
	도로시설관리			13,709,149	4,946,151	8,762,998	36.1
		시군농어촌도로확포장		7,874,963	2,912,884	4,962,079	37.0
			금마 갈산-서편간 도로확포장공사	742,594	295,250	447,344	39.8	명시 42,594
			삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	500,000	2,310	497,690	0.5
			미불용지매입비(시군도농어촌도로)	100,000	45,813	54,187	45.8
			춘포 토다리-덕동간 도로확포장공사	750,000	243,122	506,878	32.4
			금마 누동~신촌간 도로확포장	350,000	105,093	244,907	30.0
			군도 23호선 도로 확포장공사	191,360	122,028	69,332	63.8	명시 191,360
			시군도 도로관리계획및 농어촌도로 기본계획 용역	77,913	0	77,913	0	명시 77,913
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	460,258	74,525	385,733	16.2	명시 460,258
			오산면 소재지 진입도로 확포장공사	1,107,142	933,845	173,297	84.3	사고 107,142
			황등 도선-외화간 도로 확포장공사	200,000	170,423	29,577	85.2
			오산역-상아마을간 병목구간 도로확포장공사	50,000	45,960	4,040	91.9
			하나로~소간촌간 도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0
			왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사	452,641	125,350	327,291	27.7	명시 52,641
			춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0
			금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	300,000	2,524	297,476	0.8
			춘포 오룡선 도로확포장	300,000	84,935	215,065	28.3
			황등면 하동마을~동연지하차도 도로 개설공사	200,000	74,707	125,293	37.4
			춘포 노적선 도로확포장공사	550,828	260,279	290,549	47.3	명시 500,000 사고 50,828
			시군농어촌도로 확포장사업 추진	5,000	4,990	10	99.8
			시도31호 도로확포장 사업	6,191	0	6,191	0	사고 6,191
			백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	451,636	242,296	209,340	53.6	명시 451,636
			망성 신하선 도로확포장공사	100,000	34,000	66,000	34.0
			오산 용연선(모현동장례식장 ~용곤마을)도로확포장 사업	100,000	0	100,000	0	명시 100,000
			함라 행진선 도로확포장	449,400	45,434	403,966	10.1	명시 49,400
			삼기 만대선(하나로~검지마을) 도로확포장공사	80,000	0	80,000	0
			금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	0	150,000	0
		지방도 도로확포장		100,446	100,227	219	99.8
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	100,446	100,227	219	99.8	명시 100,446
		철도건널목개량사업		899,537	551,239	348,298	61.3
			황등지구 철도건널목 입체화사업	540,000	539,241	759	99.9
			평화육교재가설	359,537	11,998	347,539	3.3	명시 359,537
		주민숙원사업		36,280	32,730	3,550	90.2
			주민숙원사업	36,280	32,730	3,550	90.2
		교통관리개선사업		1,542,407	61,726	1,480,681	4.0
			성당 삼회선 도로구조개선사업	300,000	18,275	281,725	6.1	명시 300,000
			왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	358,043	5,403	352,640	1.5	사고 358,043
			낭산~시명 선형개량사업	884,364	38,048	846,316	4.3	명시 884,364
		도로조명시설관리		3,255,516	1,287,345	1,968,171	39.5
			보안등 신규 설치	215,988	93,012	122,976	43.1	사고 24,988
			노후 가로등 정비	1,407,000	346,086	1,060,914	24.6
			가로등 · 보안등 유지관리	1,614,760	842,319	772,441	52.2
			가로등 보수차량 운영유지비	17,768	5,928	11,840	33.4
	하천정비			24,166,676	6,494,634	17,672,042	26.9
		하천정비및유지관리		24,166,676	6,494,634	17,672,042	26.9
			지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	12,463,020	4,060,796	8,402,224	32.6	계속비 6,463,020
			지방하천정비(동면천)(전환사업)	5,070,118	741,053	4,329,065	14.6	계속비 2,070,118
			소하천정비(진사천)(전환사업)	1,449,872	50,349	1,399,523	3.5	명시 149,872
			소하천정비(황각천)(전환사업)	200,000	54,943	145,057	27.5
			하천제방 유지보수(자체)	2,738,103	1,310,761	1,427,342	47.9	명시 134,940
			하천제방 유지보수	702,203	86,568	615,635	12.3	명시 2,203
			국가하천유지보수(4대강)	260,000	90,600	169,400	34.8
			국가하천유지보수(4대강외)	205,000	22,818	182,182	11.1
			미불용지매입비(소하천)	25,000	8,716	16,284	34.9
			만경강 문화관	153,360	68,030	85,330	44.4
			국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	900,000	0	900,000	0
	행정운영경비(건설과)			115,117	52,378	62,739	45.5
		인력운영비		81,255	20,675	60,580	25.4
			국가하천유지보수(인력운영비)	48,000	8,599	39,401	17.9
			만경강 문화관(인력운영비)	33,255	12,076	21,179	36.3
		기본경비		33,862	31,703	2,159	93.6
			기본경비	33,862	31,703	2,159	93.6

2022 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 국가하천 만경강 파크골프장 증설사업 특별교부세 예산확보

▸2022년 상반기 지역현안 특교세 900백만원 확보	: 2022.  5.

◦ 시군도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민편익 증대

▸오산역 ~ 상아마을간 도로확포장공사(L=0.2km,B=8.0m) 준공       : 2022.  6.

▸춘포토다리 ~ 덕동간 도로확포장공사(L=1.0km,B=8.0m) 준공      : 2022.  6.

▸왕궁 양동마을 진입도로확포장공사(L=0.6km,B=8.0m) 준공     : 2022.  6.

▸낭산 ~ 시명간 선형개량사업(L=0.4km,B=8.0m) 착공        : 2022.  6.

◦ 동면천 지방하천 정비사업을 통한 재해예방 및 영농편의 도모

▸동면천 지방하천 정비사업 총사업비 증액 및 공사발주	: 2022. 2. ~ 6.

◦ 도로조명시설 확충 및 조도개선을 통한 안전한 밤거리 조성

▸LED램프 보안등 82개소 설치, LED가로등 192개소 교체

□ 반      성

◦ 시군도 농어촌도로 편입토지 협의매입이 지연되어 예산집행률이 다소 저조함 앞으로는 토지수용재결절차를 병행하여 사업추진에 차질이 없도록 노력하겠음

2022 주요업무 추진상황

		시·군도 및 농어촌도로 확포장 서수~평장간 국도대체우회도로 개설 오산 신지~영만간 국도대체우회도로 개설 지방하천 왕궁천 정비사업 지방하천 동면천 정비사업 진사소하천 정비사업 황각소하천 정비사업 만경강 친수시설 유지관리 만경강 문화관 운영 및 관리 금강 용안생태습지 유지관리 하천제방 유지관리 도로조명 조도개선

1		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 29개노선 L=22.57km, B=8.0-24.0m

◦ 총사업비 : 45,309백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투자	2022년	2023년이후	비 고
45,309	13,874	5,680	25,755

□ 상반기 추진실적

◦ 공사 완료 3개소	: 2022. 1. ~ 6.

▸오산역~상아마을간 도로확포장 외 2개소

◦ 공사 중 5개소	: 2022. 1. ~ 6.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장 외 4개소

◦ 보상 중 13개소	: 2022. 1. ~ 6.

▸오산면 소재지 진입도로확포장 외 12개소

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 6개소	: 2022. 1. ~ 6.

▸왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업 외 5개소

◦ 기타 2개소	: 2022. 1. ~ 6.

▸시·군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본정비계획수립용역 외 1개소

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 완료 1개소	: 2022. 7. ~ 12.

▸금마 누동~신촌간 도로확포장

◦ 실시설계용역 완료 6개소	: 2022. 7. ~ 12.

▸왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업 외 5개소

◦ 공사 및 토지보상 추진 17개소	: 2022. 7. ~ 12.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장 외 3개소 공사추진

▸오산면 소재지 진입도로확포장 외 12개소 토지보상 추진

◦ 기타 2개소	: 2022. 7. ~ 12.

▸시·군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본정비계획수립용역 외 1개소 용역 추진

2022년도 노선별 사업 추진 현황

□ 도 로 현 황

구 분	계	시 도	군 도	농어촌도로
노 선 수	1,539	1,264	23	252
연장(km)	1,184	461	201	522
확포장(km)	686	369	118	199
포장률(%)	57.9	80.0	58.7	38.1

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년

◦ 사업개요 : 도로확포장 L=22.57km, B=8.0~24.0m

◦ 총사업비 : 29개사업 / 45,309백만원 (2022년 5,680)

◦ 노선별 추진상황

구 분	도로등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	22예산액	금 후
계		29개노선		L=22.57km B=8.0-24m	45,309	13,874	5,680	25,755
준 공 (3)	농어촌 도 로 (3)	오산203호 (신수선)	오산역-상아마을간 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	250	200	50	-	준공
		춘포103호 (신화선)	춘포토다리-덕동간 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,540	750	750	40	준공
		왕궁207호 (양곡선)	왕궁양동마을 진입도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,410	980	400	30	준공
공 사 (5)	시 도 (1)	1268호	어양어곳-부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,100	2,150	-	950	40% 명시
	농어촌 도 로 (3)	금마102호 (누부선)	금마누동-신촌간 도로확포장	L=1.01km B=8.0m	980	580	350	50	60%
		황등104호 (황팔선)	황등도선-외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	800	400	200	200	75%
		금마101호 (서삼선)	금마갈산-서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,609	879	700	1,030	30% 명시
	군 도 (1)	9호	낭산-시명간 선형개량사업	L=0.40km B=8.0m	1,000	1,000	-	-	5% 국비50% 명시
보 상 (13)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,780	730	500	2,550	63%
	군 도 (2)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.85km B=24.0m	5,000	1,100	1,000	2,900	50% 사고
		21호	왕궁온수~시대간 (황암~상발)확포장	L=3.00km B=8.0m	2,803	616	-	2,187	57%
	농어촌 도 로 (9)	왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동-군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	-	700	45%
		삼기203호 (석라선)	하나로-소간촌간 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	1,400	600	100	700	90%
		금마202호 (서오선)	금마신정-중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	2,450	600	300	1,550	55%
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,330	130	300	900	39%
		왕궁303호 (사곡선)	왕궁가좌마을 진입로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,116	103	-	1,013	63%
		왕궁302호 (신평선)	왕궁평화촌~평리간 도로확포장	L=1.30km B=8.0m	3,445	180	-	3,265	52%
		춘포311호 (노적선)	춘포 노적선 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	700	600	-	100	10% 명시 사고
		함라301호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	100	400	1,570	0% 명시
		춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	100	1,300	0%
	미지정 (1)		황등하동-동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.63km B=8.0m	1,250	500	200	550	40%
실 시 설 계 (6)	군 도 (2)	19호	왕궁신호-용남 위험도로구조개선사업	L=0.50km B=8.0m	486	486	-	-	국비50% 사고
		7호	성당삼산마을 회전교차로	회전교차로 1식	300	300	-	-	특교세 명시
	농어촌 도 로 (4)	오산301호 (용연선)	오산 용연선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	900	100	-	800	명시
		삼기208호 (만대선)	삼기만대선 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	신규
		금마303호 (종구선)	금마종구선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,500	-	150	1,350	신규
		망성201호 (신하선)	망성신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	1,000	-	100	900	신규
기 타 (2)			시,군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본정비계획수립용역	1식	320	320	-	-	명시
			서부내륙고속도로삼기하이패스 I.C타당성조사용역	1식	70	70	-	-	사고

2		서수~평장간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 2,950억원(국 2,850 시 100)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투자	2022년	2023년이후	비 고
계	2,950	22	377	2,551
국 비	2,850	22	317	2,511
시 비	100	0	60	40

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청(익산시 → 동지역 토지보상)

□ 상반기 추진실적

◦ 2공구 도로구역결정고시 및 분할측량              : 2022.  2. ~ 4.

◦ 2공구 업무협약체결(동지역 토지보상)             : 2022.  5. 13.

◦ 황등지역 집단민원 구간 관계기관 협의(1공구)완료 : 2022.  5. 23.

◦ 2공구 보상협의회 설치 및 운영                   : 2022.  6.  8.

□ 하반기 추진계획

◦ 1공구 도로구역결정고시 및 분할측량              : 2022.  7. ~ 11.

◦ 2공구 동지역 보상계획 공고                      : 2022.  9.

◦ 2공구 동지역 손실보상금 협의                    : 2022. 10.

3		오산 신지~영만간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 신지리~영만리(국도23호~국도21호)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2030. 12.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=7.10km, B=20.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 1,888억원(공사비 1,688 보상비등 200)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투자	2022년	2023년이후	비 고
계	1,888	4	15	1,869
국 비	1,888	4	15	1,869

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 준공(1차분, 395백만원)      : 2022. 1. 26

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수(2차분, 1,500백만원)     : 2022. 1. 27

□ 하반기 추진계획

◦ 주민설명회 개최	: 2022.  7.

◦ 측량 및 토질조사 시행                            : 2022.  7.

◦ 설계자문회의(중간단계) 개최                      : 2022. 10.

◦ 설계자문회의(최종단계) 개최                      : 2023.  3.

4		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2023. 11.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9km, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원 (국 10,093 도 23,065 시 14,210)

(단위 : 백만원)

공구별	총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후
계	47,368	32,696	6,000	8,672
1지구	24,693	23,693	1,000	-
2지구	22,675	9,003	5,000	8,672

▸2022년 예산액 : 6,000백만원 (도 4,200 시 1,800)

□ 상반기 추진실적

◦ 왕궁천(1지구) 공사추진(3차분 공사중)	: 2022.  1. ~ 6.

▸발산교, 흥암교 교량 설치 완료

▸배수통관, 배수암거, U형측구 설치 완료

▸전체 공정률(1지구) : 90%

◦ 왕궁천(2지구) 공사추진(2차분 공사중)	: 2022. 1. ~ 6.

▸광암1교, 신기교 설치중(공정률 50%)

▸호안블록 설치중(공정률 60%)

▸전체 공정률(2지구) : 56%

□ 하반기 추진계획

◦ 왕궁 1지구 공사 및 건설사업관리용역 준공	: 2022.  7.

◦ 왕궁 2지구 공사 및 건설사업관리용역 준공	: 2023. 11.

5		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축(L=6.1㎞), 교량 재가설(7개소), 둑마루포장(콘크리트 L=6.1㎞, B=4.0m) 등

◦ 총사업비 : 17,317백만원(국 1,000 도 11,122 시 5,195)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후
17,317	4,650	3,000	9,667

▸2022년 예산액 : 3,000백만원 (도 2,100 시 900)

□ 상반기 추진실적

◦ 건설사업관리용역 발주                           : 2022.  2.

◦ 계약심의위원회 심의                             : 2022.  3.

◦ 원가심사(전라북도) 완료                         : 2022.  6.

◦ 시설공사(장기계속공사) 총액 발주                : 2022.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여토지 협의보상                               : 2022.  7. ~

◦ 건설사업관리용역 착수                           : 2022.  7.

◦ 공사착공                                        : 2022.  8.

6		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.687㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6㎞, 교량 재가설 6개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,066)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년 이후
1,500	200	1,300	0

▸2022년 예산액 : 1,300백만원 (시비 100%)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계용역                                     : 2022. 1. ~ 4.

▸주민설명회(2차)                                : 2022. 2. 24.

▸공공디자인위원회 심의                          : 2022. 4.  1.

▸준공                                           : 2022. 4. 11.

▸설계심의위원회 심의                            : 2022. 4. 28.

◦ 계약심사 및 공사 발주                            : 2022. 5.

◦ 공사 착공                                        : 2022. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 편입토지 감정평가 및 보상	: 2022. 7. ~ 12.

◦ 공사 추진(토공사, 구조물공사 등)	: 2022. 7. ~

7		황각소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 신용리 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.753㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축, 교량 재가설 등

◦ 총사업비 : 2,000백만원(설계 150, 보상 350, 공사 1,500)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년 이후
2,000	0	200	1,800

▸2022년 예산액 : 200백만원 (시비 100%)

□ 상반기 추진실적

◦ 토질조사용역 착수 및 준공                        : 2022. 2. ~ 3.

◦ 실시설계용역 착수                                : 2022. 3. 7.

▸공정률 50%

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계용역 주민설명회 추진                     : 2022.  7.

◦ 공공디자인위원회 심의                            : 2022.  9.

◦ 실시설계용역 준공	: 2022. 10.

◦ 편입토지 감정평가 및 협의보상	: 2022. 10. ~

◦ 공사 추진	: 2023.  4. ~

8		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=28km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 주요시설 : 6개지구 (익산지방국토관리청시행)

구 분	친수시설물	인계·인수
신지지구	자전거도로 5.42km, 친수공간 등	2016. 12.
목천지구	자전거도로 2.32km, 파크골프장 등	2016. 12.
춘포지구	자전거도로 4.0km, 축구장, 수변공원 등	2017. 1.
화전지구	자전거도로 1.3km, 구담교, 친수공간 등	2019. 1.
반월지구	자전거도로 2.8km, 축구, 야구, 족구, 농구, 인라인장 등	2021. 3.
마산지구	자전거도로 5.87km, 친수공간 등	2021. 3.

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 1,464백만원 (국 1,128 시 336)

※ 파크골프장 18홀 증설 ‘22년 특별교부세 : 900백만원

◦ 주요내용 : 친수시설관리, 제방도로 및 자전거도로 제초, 시설물보수, 목천지구 파크골프장(18홀) 증설 등

□ 상반기 추진실적

◦ 만경강 환경정비사업 추진(1~3차)	: 2022. 3. ~ 6.

▸기간제인부(2명/일) 환경정비(쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등)

◦ 친수시설 유지관리	: 2022. 1. ~ 6.

▸자전거도로 볼라드·차선유도봉 설치(5개소), 전망데크 보수공사(4개소)

▸이미지 방지턱 설치(4개소), 태양광가로등(12개소) 설치, 파크골프장 예초(A=9,600㎡, 3회)

◦ 만경강 하천구역 내 불법행위 계도 및 강제철거	: 2022. 4. ~ 5.

▸하천구역 내 불법점용시설물(텐트, 카라반 등) 계도, 현수막 게시,

보도자료 배포

▸불법점용시설물 강제철거(7개소)

◦ 만경강 야외수영장 타당성 및 기본계획 구상용역 착수	: 2022. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 만경강 환경정비사업 추진	: 2022. 7. ~ 11.

◦ 친수시설 유지관리	: 2022. 7. ~ 11.

▸이동식 그늘막(퍼걸러) 설치(4개소)

▸제방도로 및 산책로 풀깎기(A=166,100㎡)

◦ 파크골프장 증설 실시설계 및 행정절차 진행	: 2022.7. ~ 2023.7.

▸하천점용허가(환경청), 소규모환경영향평가, 공공디자인심의 등

◦ 야외수영장 타당성 및 기본계획 구상용역 준공	: 2022. 12.

9		만경강 문화관 운영 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 186백만원(시비)

◦ 시설규모 : 부지면적 13,814㎡ (지상2층, 지하1층, 연면적 1,658㎡)

생태전시관, 체험관, 다목적실, 야외광장 등

◦ 주요내용 : 만경강 문화관 운영 및 시설물 유지관리

□ 상반기 추진실적

◦ 만경강 문화관 기간제 근로자 및 시간선택임기제 채용	: 2022. 2.

▸기간제근로자 4명(운영업무보조 2, 환경미화 1, 조경및시설관리 1), 시간선택임기제1명

◦ 만경강 문화관 개관식 및 운영                     : 2022. 3. ~

◦ 반려식물 소품제작 등 「자연 담은 체험 프로그램」 운영	: 2022. 5. ~ 6.

▸수·목·토요일/ 익산시민 및 관내 단체 대상/ 15~20명(회당)/ 4회 실시(71명)

□ 하반기 추진계획

◦ 만경강 문화관 조경시설 풀깎기(A=6,000㎡, 3회)	: 2022. 7. ~ 10.

◦ 만경강 문화관 관수시설(스프링클러) 설치	: 2022. 7.

◦ 반려식물 소품제작 등 「자연 담은 체험 프로그램」 운영	: 2022. 7. ~

▸수·목·토요일/ 익산시민 및 관내 단체 대상/ 15~20명(회당)

10		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 전망데크 연결도로 안전난간설치, 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초, 노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 835백만원 (국비 440 시비 395)

□ 상반기 추진실적

◦ 금강 용안생태습지 환경정비사업 추진(1~3차)	: 2022. 3. ~ 6.

▸기간제인부(30명/일) 환경정비(쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등)

◦ 친수시설 유지관리	: 2022. 3. ~ 6.

▸배수로 정비 공사(L=3.8km)

▸초화류 파종 및 식재(유채 14,000㎡, 꽃백일홍 20,000주, 해바라기 2,800㎡)

▸꽃잔디 식재(1,800㎡, 65,000주)

□ 하반기 추진계획

◦ 금강 용안생태습지 환경정비	: 2022. 7. ~ 11.

◦ 친수시설 유지관리 추진	: 2022. 7. ~ 11.

▸산책로 황토포장 보수(A=1,000㎡)

▸수생연못 연꽃보식(6,000주)

▸전망데크 연결도로 안전난간 설치(L=400m), 웅포캠핑장 제방도로 태양광가로등 설치(L=680m, 18EA)

▸목교, 데크, 광장, 화장실 등 유지보수

11		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 집중호우대비 시설물보수, 하상준설, 지장물제거, 제방 및 호안 제초, 예초 등

◦ 총사업비 : 1,568백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	단 위 사 업 별	2022 예산액	주 요 내 용	실 적
	합 계	1,568
준설	어량천 하천준설	100	하상준설 및 수목제거	완 료
	필동천 하천준설	50		완 료
	목천동 목천포천 하천준설	50		완 료
	대조천 하천준설	100		완 료
	춘포면 익산천 하천준설	50		완 료
	성당면 외두천 하천준설	60		완 료
	금마면 외산천 하천준설	50		완 료
	탑천 하천준설	150		완 료
	은기동 중앙마을 소하천 준설	19		하반기
제방보수 및 보강	소하천 유지보수	500	21년 응급복구 및 22년 호우피해 대비 등	연 중
	덕기동 익산천 제방보수	100		완 료
	도천마을 교량연석 보수 및 확장	7		완 료
둑마루 제방포장	여산면 강경천 제방포장	50	제방(둑마루) 콘크리트 포장 등	완 료
	죽청천 제방포장	220		완 료
제초	석왕천 제방 제초	10	제방 제초작업 및 수목제거	하반기
안전점검	오산제 등 9개소 정기안전점검용역	12	제방 및 배수문에 구조적 안전성 및 손상상태 점검	하반기
	원수우안1지구 외 6개소 정밀 안전점검 용역	40		완 료

□ 하반기 추진계획

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리	: 연 중

12		도로조명 조도 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 생활환경개선 보안등 설치 외 11개사업

◦ 총사업비 : 1,596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산	비 고
합 계		12개 사업	1,596
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등 신규설치 1식	191
노후 가로등 정비	도심지역 가로등 유지보수	가로등 보수단가 1식	130
	산업단지 가로등 유지보수	가로등 보수단가 1식	40
	읍면지역 보안등 보수	보안등 보수단가 1식	120
	동지역 보안등 보수	보안등 보수단가 1식	90
	전기안전점검부적합보수단가	부적합 보수단가 1식	30
	노후 보안등기구 교체	보안등 교체 및 정비 1식	42
	가로등 노후 점멸기 교체공사	점멸기 교체 및 정비 1식	23
	도심지역노후가로등교체공사	노후가로등정비 1식	100
	노후가로등LED교체공사	LED등기구교체 1식	100
	산업단지조도개선공사	등기구 교체 및 정비 1식	80
	영등동 가로환경 가로등 정비사업	가로등 교체 및 정비 1식	650

□ 상반기 추진실적

◦ 보안등 신규설치사업 추진(87백만원 집행)	: 2022.  1. ~ 6.

▸관내 보안등 82개소 설치 및 106개소 개선

◦ 노후가로등 정비사업 추진(346백만원 집행)	: 2022.  1. ~ 6.

▸LED가로등기구 192개소 교체, 기타 가로(보안)등 보수 및 정비 등

□ 하반기 추진계획

◦ 보안등 신규설치 잔여사업 마무리	: 2022.  7. ~ 12.

◦ 노후가로등 정비 잔여사업 마무리	: 2022.  7. ~ 12.