2022.  7.

제244회 익산시의회(임시회)

― 2022 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	국가식품클러스터담당관

국가식품클러스터담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 상반기 성과 및 반성
□	2022 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
국가식품클러스터, 첨단 식품산업 메카로 지원⸱육성

		전 략 목 표
◦ ◦	국가식품클러스터 본격 활성화 국내․외 유수기업 및 연구소 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	기업활동에 적합한 기반시설 및 신규 혁신 인프라 확충 전략적인 맞춤형 투자유치 활동 전개 기업 준공 가속화에 따른 맞춤형 기업지원 강화 지역 농산물 공급·소비 촉진 및 소규모 식품산업 육성

일  반  현  황

□ 기          구

					국가식품클러스터담당관
식품인력계			기업유치계					농산물지원계				산단조성계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14	1	4	4	4	1
현 원	14	1	5	4	0	4
증 감	0	0	1	0	△4	3

□ 사  무  분  장

◦ 식품인력	:	국가식품클러스터 기획조정, 신규사업 발굴 및 국가예산확보, 식품인력 수급 정책, 기능성식품 제형센터 건립․운영, 한국식품산업클러스터진흥원․기업지원시설 운영 관리, 대ㆍ내외 교류협력 사업 추진, 외국인투자지역 관리․운영
◦ 기업유치	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치, 산학연 교류 협력 지원, 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립, 국가식품클러스터 홍보
◦ 농산물지원	:	국가식품클러스터 농산물 공급 지원 총괄 기획 및 조정, 농식품원료 중계․공급센터 구축 및 운영, 식품산업 육성사업 추진 기업 및 기술지원 사업, 지역식품산업 육성 및 관리
◦ 산단조성	:	식품전문산업단지 조성지원, 산업단지 기반시설 확충, 소스산업화센터 운영, 기업지원시설 장비구축, 배후복합도시 및 2단계 조성, 복합문화센터 건립

2022 예산집행실적

【 2022. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
국가식품클러스터담당관				16,104,701	10,872,792	5,231,909	67.5
	국가식품클러스터			16,078,674	10,864,315	5,214,359	67.6
		국가식품클러스터사업		15,588,875	10,743,596	4,845,279	68.9
			식품클러스터 사업	57,360	20,396	36,964	35.6
			인력자원 개발 및 교육 지원	30,000	30,000	0	100.0
			기관운영관리	979,000	979,000	0	100.0
			투자유치 및 홍보	130,000	130,000	0	100.0
			기업비즈니스지원	298,000	298,000	0	100.0
			기업기술지원	205,000	205,000	0	100.0
			익산식품대전 참가 및 운영 지원	50,000	0	50,000	0.0
			입주기업 교통수당 지원	440,000	228,400	211,600	51.9
			입주기업 기숙사 임차비 지원	50,000	39,080	10,920	78.2
			기업유치 지원	10,000	0	10,000	0.0
			기업이전비 지원	5,500	2,750	2,750	50.0
			국가식품클러스터홍보관 운영	2,400	826	1,574	34.4
			홍보전광판 운영	35,360	4,593	30,767	13.0
			국가식품클러스터 복합문화센터 건립	3,927,082	1,120,049	2,807,033	28.5	명시 1,198,711 사고 108,369
			국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획용역	76,891	0	76,891	0.0	명시이월
			국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구	129,551	98,352	31,199	75.9	사고이월
			소스산업화센터 건립(운영)	1,350,000	1,350,000	0	100.0
			기능성 원료은행 구축사업	7,794,731	6,236,751	1,557,980	80.0	명시 2,925,457 사고 146,274
			국가식품클러스터상징조형물 운영	18,000	399	17,601	2.2
		농식품유통사업지원		489,799	120,719	369,080	24.6
			식품산업 육성지원	73,580	5,000	68,580	6.8
			농촌자원 복합산업화사업 (농식품기업 맞춤형지원사업) (전환사업)	91,000	0	91,000	0.0
			메이커 스페이스 구축 운영사업	16,000	16,000	0	100.0
			전통식품 마케팅 활성화지원 (전환사업)	80,000	80,000	0	100.0
			전통식품 체험시설 지원사업 (전환사업)	129,500	0	129,500	0.0	사고이월
			창업 식품기업 지원사업 (전환사업)	19,719	19,719	0	100.0
			식품기업 국가식품클러스터 기업지원시설활용지원 (전환사업)	20,000	0	20,000	0.0
			계약재배 활성화사업	60,000	0	60,000	0.0
	행정운영경비			26,027	8,477	17,550	32.6
		기본경비		26,027	8,477	17,550	32.6
			기본경비	26,027	8,477	17,550	32.6

2022 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 맞춤형 투자유치 활동으로 분양계약 체결	: 10社 95천㎡

‣ 에프비홀딩스(과일컵, 28,459㎡), ㈜위바이옴(건강기능식품, 14,201㎡) 등

◦ 기업비즈니스 지원 활성화 (기업 공동사업, 비즈니스 플랫폼 지원 등)  : 102社

◦ 기업기술지원

‣ 식품기업 기술지원 : 70社 83건 (담꽃, 휴바이오, 세인식품 등)

‣ 개방형 장비 공동 활용 지원 : 168社 3,761건 (입주기업 : 47社 782건)

◦ 입주기업 인력수급 지원	: 55社359명

‣ 지역주도형 일자리 (21社 27명), 식품기업 취업연계(34社 332명)

◦ 국가식품클러스터 입주기업 지원사업 추진(5월 기준)

‣ 교 통 수 당 : 228,400천원(55社 589명, 누적 2,284명)

‣ 기숙사 임차비 : 39,080천원(18社 47명, 누적 165명)

◦ 국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구용역 준공	: ‘22. 4.

◦ 복합문화센터 건립공사 착공	: ‘22. 4.

◦ 청년식품 창업허브센터 건립공사 착공	: ‘22. 4.

□ 반      성

◦ 미분양용지 조기분양을 위한 업종 완화 추진 지연

▸투자수요가 낮은 연관업종 및 음료업종 부지에 식료품 제조업종 추가를 통한 분양 활성화           ⇒ 중앙정부, 전북도, 진흥원 등과 협의 노력

2022  주요업무 추진상황

		투자유치 활 동 강화
		기업비즈니스지원활성화
		기업기술지원
		기능성식품 제형센터 건립
		기능성 원료은행 구축
		청년식품 창업허브 구축
		국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구
		국가식품클러스터 복합문화센터 건립
		식품산업(농식품기업 등) 육성 지원
		입주기업 지원사업(교통수당, 기숙사 임차비)

1		투자유치 활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월

◦ 총사업비 : 1,851백만원(국비 1,573 도비 56, 시비 130, 자부담 92)

◦ 사업내용 : 국내‧외 투자유치 활동(투자상담, 투자컨설팅단 운영, 투자설명회 등)

□ 상반기 추진실적

◦ 분양현황 : 123社                             ※ 2022년 : 10社 95천㎡

[단위 : 천㎡(천평), %]

총면적	분 양		미분양	비고
	면 적	비 율	면 적
1,377(417)	1,044(316)	75.8	333(101)	2022. 6. 28. 기준 (준공 65社, 착공 15社)

◦ 투자관심기업 초청 및 방문 투자상담	: 54社 79회

◦ 미니설명회 개최	: 4회 45명

◦ 투자유치 컨설팅단(투자유치전문위원) 투자상담	: 27社 30회

◦ 분양기업 착공 등 지원

▸ 분양기업 입주지원 회의	: 7社 24명

▸ 준공기업 CEO 소통간담회	: 3社 31명

▸ 고충처리자문단 활동	: 4社 4회

□ 하반기 추진계획

◦ 투자유치 활동 및 분양기업 관리	:‘22. 7. ~ 12.

▸ 투자관심기업 초청 및 방문 투자상담 추진

▸ 유관기관 연계 투자설명회 및 전략형 미니설명회 개최

▸ 컨설팅단 기업유치 활동 및 워크숍 추진

▸ 준공기업 소통간담회 및 분양기업 입주지원 회의 추진

▸ 기업방문 고충처리 자문운영 추진

2		기업 비즈니스 지원 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월

◦ 총사업비 : 4,261백만원 (국비 3,622, 도비 127, 시비 298, 자부담 214)

◦ 사업내용 : 비즈니스 지원을 통한 기업 경쟁력 강화 및 청년 창업자 육성

□ 상반기 추진실적

◦ 기업성장 지원	:‘22. 1. ~ 6.

▸ 학연교류 실무형 현장실습 지원 (20개 대학 46명)

▸ 비즈니스 플랫폼 (86社 938개 제품)

▸ 기업 공동사업 지원 (10社 5과제)

◦ 벤처창업 활성화 지원	:‘22. 1. ~ 6.

▸ 청년식품 창업성장지원	: 108개팀

- 식품창업 전문교육 및 시제품 제작 지원

▸ 식품벤처센터 입주기업 벤처 인증 획득 지원 등	: 6社 11건

□ 하반기 추진계획

◦ 기업성장 지원	:‘22. 7. ~ 12.

▸ 입주기업 성장을 위한 비즈니스 지원 및 기업연합 홍보 등 마케팅 활성화 지원

◦ 벤처창업 활성화 지원	:‘22. 7. ~ 12.

▸ 청년식품 창업 교육 및 시제품 제작 지원, 벤처센터 입주기업 지원 등

3		기업 기술지원

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월

◦ 총사업비 : 3,308백만원(국비 2,812, 도비 88, 시비 205, 자부담 203)

◦ 사업내용 : 기업 기술력 강화 지원, 산학연 네트워크 활성화

□ 상반기 추진실적

◦ 기업 기술력 강화 지원	:‘22. 1. ~ 6.

▸ 공동기술 개발 사업 (34社 37건)

▸ 권역별 산학연 기술 지원 (6社 6건)

▸ 식품기업 시설 인증 지원 (27社 37건)

▸ 제품 마켓 테스트 (3社 3건)

▸ 장비 활용 지원 (168社 3,761건 / 입주기업 47社 782건)

◦ 인증획득 및 운영	:‘22. 1. ~ 6.

▸ KOLAS 재지정 및 GLP 인증을 위한 제반사항 구축

◦ 산학연 네트워크 활성화	:‘22. 1. ~ 6.

▸ 지원사업 통합공고 운영 및 선정평가회 개최(3회)

▸ 건강기능식품 정책 설명회 및 GMP 발전 협의회 개최

▸ 제12회 국가식품클러스터 국제컨퍼런스 개최(6.22)

□ 하반기 추진계획

◦ 기업 기술력 강화 지원	:‘22. 7. ~ 12.

▸ 진흥원 인프라를 활용한 기술 지원 및 장비 활용 지원

◦ 인증획득 및 운영	:‘22. 7. ~ 12.

▸ KOLAS·시험검사기관·GLP·GMP·HACCP 인증 획득

◦ 산학연 네트워크 활성화	:‘22. 7. ~ 12.

▸ 상담창구 운영 및 산학연 전문가 활용

▸ DLG 국제식품품평회 참가 지원 및 성과 확산을 위한 수상제품 홍보

4		기능성식품 제형센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

◦ 총사업비  : 17,640백만원(국비)   - 부지매입비 별도(660백만원, 시비)

▸‘22년 예산 : 5,033백만원(국비)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(왕궁면 광암리 1427)

◦ 규    모 : 부지 3,959.6㎡(1,200평), 건축연면적 4,060㎡(1,230평)

▸ 주요시설 : 일반제형실, 특수제형실, 제형품질검사실, 연구실 등

◦ 사업내용

▸ 기능성식품 제형센터 설계용역 (1,000백만원 / 2019년)

▸ 기능성식품 제형센터 건립 (11,290백만원 / 2020년 ~ 2022년)

▸ 기능성식품 제형센터 장비 구축 (5,350백만원 / 2020년 ~ 2022년)

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

□ 상반기 추진실적

◦ 기능성식품 제형센터 건립공사(공정률 100%)	:‘20. 12. ~‘22. 4.

◦ 임시운영소 운영 및 장비구축	:‘20. 12. ~‘22. 6.

▸ 연구장비 36종ㆍ빌트인장비 8종ㆍ생산장비 8종 도입완료

□ 하반기 추진계획

◦ 장비 구축 완료	:‘22. 7. ~ 9.

▸ 생산장비 15종 도입

◦ 기능성식품 제형센터 운영	:‘22. 9. ~

5		기능성 원료은행 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

◦ 총사업비 : 15,000백만원(국비 10,500, 도비 1,350, 시비 3,150)

▸‘22년 예산 : 4,723백만원(국비 3,305, 도비 425.4, 시비 992.6)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(왕궁면 광암리 1409)

◦ 규    모 : 건축 600㎡, 연면적 1,800㎡(지하1층, 지상3층)

◦ 사업내용 : 기능성 원료은행의 건축, 장비 구축 및 운영지원

▸ (원료개발) 신규 기능성 원료 발굴 및 기능성 규명

▸ (원료표준화) 기능성원료 표준화를 위한 제조공정 확립 및 생산

▸ (보관/분양) 표준화된 원료(또는 기능성분) 보관 및 공급

◦ 시행기관 : 익산시(한국식품산업클러스터진흥원 위탁 수행)

□ 상반기 추진실적

◦ 운영협의체 협의(농식품부, 전북도, 익산시, 진흥원)	:‘22. 4. 1.

▸ 사업추진 계획(예산, 일정, 임시연구소 운영 등) 논의

◦ 기본 및 실시설계 완료	:‘22. 4. 8.

◦ 건축 입찰 의뢰(조달청)	:‘22. 4. 27.

◦ 장비 구축 및 도입 장비 심의위 개최	:‘22. 5. 31.

▸ 표준화 장비 8종 구축, 생산 장비 2종 심의

□ 하반기 추진계획

◦ 건축 착공 및 공사 추진	:‘22. 8. ~‘23. 12

◦ 장비 구축	:‘22. ~ ‘23.

6		청년식품 창업허브 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)

◦ 총사업비 : 28,232백만원(국비)   - 부지매입비 별도(1,695백만원, 시비)

▸‘22년 예산 : 8,427백만원(국비)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(왕궁면 광암리 1427-1번지)

◦ 규    모  : 부지 9,544.3㎡(2,887평), 연면적 9,329.39㎡(2,822평, 지하1층, 지상4층)

▸ 주요시설 : 학습 및 체험공간, 커뮤니케이션 공간, 시제품 제작공간, 창업공간 등

◦ 사업내용

▸ 청년식품 창업허브센터 설계 용역 (928백만원 / 2020년 ~2021년)

▸ 청년식품 창업허브센터 구축 (27,304백만원 / 2022년 ~2024년)

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

◦ 건립공사 및 감리용역 추진	:‘22. 4. ~
▸ 감리용역 착수	:‘22. 4. 11.
▸ 건립공사 착공	:‘22. 4. 14.

□ 상반기 추진실적

◦ 건립공사 및 감리용역 추진	:‘22. 7. ~‘24. 1.
▸ 파일 항타, 기초 및 골조공사

□ 하반기 추진계획

7		국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구

◦ 용역기간 : 2020년 5월 ~ 2022년 4월

◦ 용 역 비 : 300백만원(도 100, 시 200)

◦ 주요내용 : 국가식품클러스터 1단계 역량강화, 집적화, 기능보강, 산업단지 확장 개별사업 발굴 및 산업단지 확장 타당성 등

□ 상반기 추진실적

◦ 국가식품클러스터 활성화 용역 재착수	:‘22. 2.
▸ 최종보고회	:‘22. 3.
◦ 20대 대선공약 선정 건의(2단계)	:‘22. 2. ~ 4.
◦ 국가식품클러스터 활성화 용역 준공	:‘22. 4.
◦ 20대 대통령 전북지역공약(2단계) 선정	:‘22. 5.
▸ 국가식품클러스터 2단계 확대 및 거점 조성
◦ (농식품부) 20대 대선공약(2단계) 기재부에 예산 요구	:‘22. 5.
▸ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역(2023년)

□ 하반기 추진계획

◦ 국가식품클러스터 2단계 사업 추진 건의	:‘22. 7. ~
▸ 농식품부, 전북도, 국회 등

8		국가식품클러스터 복합문화센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

◦ 총사업비 : 4,000백만원(도 2,000, 시 2,000)

▸‘22년 예산 : 2,620백만원(공사비)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426-1번지(산업단지 내)

◦ 규    모 : 부지 2,271㎡(687평), 연면적 1,118.13㎡(338평)

◦ 사업내용 : 입주 근로자 정주여건 개선을 위한 기타 편의시설 구축

▸ 식당, 체력단련실, 전시판매장, 라이브방송실, 사무실 등

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	:‘22. 1.
◦ 건립공사 및 감리용역 추진(공정률 5%, 기초공사 중)	:‘22. 4. ~
▸ 건립공사 및 감리용역 착수	:‘22. 4. 5.
▸ 건립공사 및 감리용역 일시 정지	:‘22. 6. 17.
- 사유 : 관급자재(철근) 납품지연 및 장마기간 도래로 공사추진 어려움

□ 하반기 추진계획

◦ 건립공사 및 감리용역 추진	:‘22. 8. ~
◦ 관리운영 조례 제정	:‘22. 10. ~

9		식품산업 (농식품기업 등) 육성 지원

□ 사 업 개 요

◦ 농식품기업 맞춤형 지원사업

▸ 식품기업 경쟁력 제고를 위한 시설 개보수 및 장비 설치, 연구개발 등 맞춤형 지원

- 사 업 비 : 130백만원 (도비 65, 시비 26, 자부담 39)

- 지원대상 : 농업생산자단체(영농조합법인, 농업회사법인 등) 및 식품기업

◦ 익산식품대전

▸ 온․오프라인 전시, 기획전, 바이어상담회, 라이브커머스 등(예정)

- 사업위치 : 한국식품산업클러스터진흥원 및 온라인

- 사 업 비 : 296백만원(국비 246, 시비 50)

◦ 식품산업 육성지원

▸ 국가식품클러스터 농산물 공급 물류비, 식품박람회 참여업체 부스비, 식품기업 마케팅 활성화 지원 및 소규모 식품기업 포장재, 콘테이너박스 지원

- 사 업 비 : 136.1백만원(시비 72.6, 자부담 63.5)

- 지원대상 : 관내 식품제조 및 가공업체

◦ 전통식품 마케팅 활성화 지원

▸ 전통식품(전통주 포함) 공동 마케팅 프로모션 및 활성화 지원 등

- 사 업 비 : 100백만원 (도균특 50, 시비 30, 자부담 20)

- 지원대상 : 전통식품(전통주 포함) 등을 직접 제조⸱판매하는 업체

□ 상반기 추진실적

◦ 보조금 교부 결정 및 사업추진	:‘22. 3. ~

▸ 농식품기업 맞춤형 지원 (청하식품)

▸ 식품산업 육성지원 (프레시고 외 16개소)

▸ 전통식품 마케팅 활성화 지원 (황수연 전통식품, 깊은숲속행복한식품)

□ 하반기 추진계획

◦ 사업추진 및 완료	:‘22. 7. ~ 12.

◦ 보조금 정산	:‘22. 12.

10		입주기업 지원사업 (교통수당, 기숙사 임차비)

□ 사 업 개 요

◦ 지원기간 : 2022년 2월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 490백만원(교통수당 440, 임차비 50)

◦ 사업내용

▸ (교통수당) 국가식품클러스터 산업단지 입주기업에 종사하고 익산시에 주소를 둔 근로자에게 월 10만원 지원

▸ (기숙사 임차비) 국가식품클러스터 산업단지 입주기업이 관내 공동주택을 임차하여 근로자에게 기숙사로 제공하는 경우 임차료(월세) 80%(최대 30만원)지원

□ 상반기 추진실적

◦ 입주기업 근로자 교통수당 지원	: 228,400천원(55社 589명, 누적 2,284명)

◦ 입주기업 근로자 임차비 지원	:  39,080천원(18社  47명, 누적  165명)

※ 인구전입 37명(‘22. 5월말 기준)

◦ 기업인 편의를 위한 현장방문 접수(진흥원)	: 5회

□ 하반기 추진계획

◦ 교통수당ㆍ기숙사 임차비 접수 및 지급	:‘22. 7. ~ 12.

▸ 고용지원 및 산업단지 근로자의 근무환경 개선

▸ 인구유입을 통해 익산시 인구증대 및 국가식품클러스터 활성화

◦ 지원사업 만족도 등 조사	:‘22. 9.