2022.  7.

제244회 익산시의회(임시회)

― 2022 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

도로과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 상반기 성과 및 반성
□	2022 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 쾌적한 도로환경 조성

		전 략 목 표
◦	도로의 유지 및 관리 철저로 안전한 시민생활 영위
◦	품격 있는 광고문화 정착으로 감성적인 아름다운 거리 조성

		중 점 과 제
◦	효율적인 도로, 시설물 유지보수 및 관리체계 운영
◦	시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진
◦	불법광고물·노점상·노상적치물 정비로 쾌적한 가로환경 조성

일  반  현  황

□ 기          구

					도 로 과
도로행정			도로관리			도로기반			가로정비			자전거정책

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	27		1	6	10	7	3
현 원	27		1	8	8	4	6
증 감	-		-	2	△2	△3	3

※ 공무직 24명(도로행정 1, 도로관리 17, 가로정비 6)

□ 사  무  분  장

	◦	도로행정	:	국․공유재산(도로) 관리, 운행제한차량 허가 및 단속, 도로점용허가, 도로굴착심의, 도로점용료 부과 및 징수
	◦	도로관리	:	도로(인도)정비 및 유지보수, 교량․지하차도․육교 유지관리, 도로표지판 등 도로시설물 설치 및 유지관리, 도로생활민원처리, 도로방재대책 및 제설작업
	◦	도로기반	:	주민숙원사업, 마을안길 정비공사, 비법정도로 확포장공사, 안전한 보행환경사업, 교통사고 잦은곳 개선사업
	◦	가로정비	:	옥외광고물 표시 허가 및 사후관리, 불법광고물 지도 단속 및 관리, 노점상 및 노상적치물 지도 단속 및 관리
	◦	자전거정책	:	자전거이용 활성화 계획수립, 자전거도로 정비사업, 자전거 보험 가입, 녹색교통 만들기 사업

□  도 로 현 황

(단위 : 개소/km)

구 분	총 연 장		포 장		미 포 장		포장율 (%)
	노선	연장	노선	연장	노선	연장
합 계	1,566	1,442.2	1,253	921.6	313	520.6	63.9
고속도로	1	17.3	1	17.3			100
일반국도	5	77.6	5	77.6			100
지 방 도	12	163.1	10	143.9	2	19.2	88.2
시 도	1,273	462.6	1,105	370.3	168	92.3	80.0
군 도	23	199.6	13	113.9	10	85.7	57.0
농어촌도	252	522	119	198.6	133	323.4	38.0

□  교량․육교․지하차도 현황

(단위 : 개소)

관리청	계	고속 도로	국도	지방도	시군도	농어 촌도	육교 (지하보도)	지하 차도
계	167	9	31	19	36	57	10(1)	5
도로공사	9	9	-	-	-	-	-	-
국도유지	20	-	20	-	-	-	-	-
도로관리 사 업 소	19	-	-	19	-	-	-	-
익 산 시	119	-	11	-	36	57	10(1)	5

□ 장 비 현 황

(단위 : 대)

합계	굴삭기	덤프	화물차	살포기	다짐기	제설기
41	2	4	6	15	3	11

□ 주요자재 보유현황

염화칼슘	모래	소금	보도블럭	경계석
30톤	300㎥	513톤	400㎡	500개

□ 지정 게시대 현황

구분	현수막 게시대
	소 계	상업용			행정용
		연립	저단	2단	연립	저단	육교
기	329	173	71	6	28	43	8
면수	1,214	844	129	24	121	80	16

□  위원회 현황

(단위 : 명)

위 원 회 명	위 원 장	위 원 수			비 고
		계	당연직	위촉직
도로관리심의회	부 시 장	13	8	5
옥외광고심의위원회	건 설 국 장	9	3	6

2022 예산집행실적

【 2022. 6. 15. 현재 】                                     (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도로과				22,160,919	6,616,681	15,544,238	29.9
	도로환경개선			12,395,304	2,781,199	9,614,105	22.4
		사설안내표지판 관리		16,400	5,000	11,400	30.5
			사설안내표지판 정비사업	16,400	5,000	11,400	30.5
		포장도로 유지관리		8,522,512	1,938,014	6,584,498	22.7
			시내일원 아스콘 소파보수	302,000	53,365	248,635	17.7
			도로보수 폐기물 처리	50,000	20,000	30,000	40.0
			읍면동 도로붕괴 보수	201,000	21,284	179,716	10.6
			포장도로 유지관리	2,845,856	1,042,090	1,803,766	36.6	명시이월
			읍면동 사리부설	30,000	0	30,000	0
			인도 보수 및 정비	4,364,806	624,475	3,740,331	14.3	명시이월
			건설장비 및 차량 유지관리	196,350	89,948	106,402	45.8
			시내 노후도로 덧씌우기	100,000	86,852	13,148	86.9
			생활민원 현장처리	50,000	0	50,000	0
			이리영등초등학교 통학로 지중화(22년)	382,500	0	382,500	0
		시설물 유지관리		2,290,148	650,339	1,639,809	28.4
			지하차도 및 지하보도, 육교 등 유지관리	325,000	186,767	138,233	57.5
			교량 유지관리	1,436,701	146,764	1,289,937	10.2	명시이월 사고이월
			시설물안전점검지원사업 (교량정밀점검)	30,000	0	30,000	0
			도로표지판 보수 및 정비	45,000	37,452	7,548	83.2
			도로 시설물 보수 및 정비	414,000	259,156	154,844	62.6
			도로교통량조사 및 집계원 인건비	26,247	7,000	19,247	26.7
			도로관리상황실 유지관리	13,200	13,200	0	100
		불법광고물 정비		1,566,244	187,846	1,378,398	12.0
			불법광고물 방지시설 설치 및 유지관리	125,354	87,193	38,161	69.6
			행정게시대 관리	104,000	1,500	102,500	1.4
			노점상 정비	11,690	11,690	0	100
			간판개선 사업	1,325,200	87,463	1,237,737	6.6	명시이월 사고이월
	도로기반관리			8,012,226	3,126,261	4,885,965	39.0
		소규모주민숙원사업		5,960,156	2,471,893	3,488,263	41.5
			소규모주민숙원사업	1,182,480	932,701	249,779	78.9	명시이월
			주민편익증진사업 (보조)	80,000	28,377	51,623	35.5	명시이월
			마을안길 노후도로 정비공사	3,619,066	1,267,625	2,351,441	35.0	명시이월 사고이월
			숭모공원~석치마을간 도로확포장공사	337,137	114,601	222,536	34.0	명시이월
			지역밀착형 참여사업 (마을안길)	379,415	128,589	250,826	33.9	명시이월
			(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	162,058	0	162,058	0	사고이월
			하나로 교통혼잡 개선사업	200,000	0	200,000	0	명시이월
		위험도로개선		552,941	255,052	297,889	46.1
			교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	552,941	255,052	297,889	46.1	명시이월
		자전거도로 이용시설 활성화사업		1,499,129	399,316	1,099,813	26.6
			자전거도로 이용시설 활성화사업	1,499,129	399,316	1,099,813	26.6	명시이월
	행정운영경비			1,753,389	709,221	1,044,168	40.4
		인력운영비		1,709,576	668,348	1,041,228	39.1
			인력운영비	1,709,576	668,348	1,041,228	39.1
		기본경비		43,813	40,873	2,940	93.3
			기본경비	43,813	40,873	2,940	93.3

2022 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 안전한 도로 유지 관리

▸노후 포장도로 유지관리 L=5.3km, 인도 보수 및 정비 L=3.4km

▸도로점용허가 및 도로관리심의회 운영 : 355건 / 2회(31개소)

▸영등동 가로환경 정비 설문조사 및 주민설명회 실시, 행정절차추진

◦ 도로 및 교량 안전을 위한 과적·제한차량 계도 및 단속

▸과적차량검차 : 550건(8건 적발, 과태료 3,060천원 부과)

▸교량유지관리 : 상반기 안전점검 추진, 송학교·모현대교 보수보강공사 추진

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

▸소규모 주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비 등 민원 처리 : 137건

▸소파보수 등 생활민원 처리 : 2,050건

(견문보고 400건 / 생활민원 1,200건 / 자체정비 450건)

▸불법 노점상 및 광고물 정비 : 21,391건

(불법 노점상 및 노상적치물 :4,854건 / 불법광고물 : 16,537건)

▸시 지정 벽보판 철거 : 56개소 111면

▸현수막 게시대 신규설치 : 10개소 31면

▸불법광고물 수거보상제 시행 : 416,984건(보상금 지출 70백만원)

◦ 자전거 이용 활성화 사업으로 자전거 이용자 만족도 증가

▸자전거 대여소 운영 : 2개소 5,017대(웅포 1,463, 만경강 3,554)

▸자전거보험 보험금 지급 : 33건 15백만원

□ 반      성

◦ 동시다발적 민원에 대한 신속응대 미흡

◦ 도시가로변 위법행위(현수막, 적치물 등) 즉각 대처 미흡

2022 주요업무 추진상황

		도로관련 허가 및 관리 포장도로 유지관리 사업 영등동 가로환경 정비사업 교량 및 시설물 유지관리 생활여건개선을 위한 주민숙원사업 가로환경 정비사업 간판개선사업 자전거 이용 활성화 사업

1		도로관련 허가 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 도로점용(일반, 굴착, 일시) 허가

▸이중 굴착 방지를 위한 도로관리심의회 운영(연 4~5회)

◦ 국·공유재산 및 도로재산 관리

▸도로 등 국·공유재산 실태조사 및 무단점유관리

▸사용수익허가, 용도폐지 및 무상귀속 등 도로 관련 협의

◦ 과적제한차량 단속 및 계도

▸평화육교 과적단속 초소 외 단속지점 지정 운영(34개소)

□ 상반기 추진실적

◦ 도로점용(일반, 굴착, 일시) 허가 및 협의 : 459건

▸도로점용허가 355건, 준공확인 94건, 실과(타기관) 협의 10건

◦ 도로점용료 부과·징수(수시분)           : 206건 / 53백만원

※ 코로나 19로 인해 정기분 6월에 부과

◦ 도로관리심의회 운영                    : 2회(31개소, 16.1km)

◦ 국·공유재산 사용수익허가 및 용도폐지   : 87건

◦ 과적제한차량 합동단속 및 불시단속 추진

▸검차 550대, 과적단속 8대(과태료 3,060천원 부과), 합동단속 2회

□ 하반기 추진계획

◦ 도로관리심의회 운영(2회) 및 도로점용 허가 추진

◦ 국·공유재산 실태조사, 사용수익허가 등 재산 관련 민원처리

◦ 과적제한차량 합동단속(2회) 및 불시단속 추진

2		포장도로 유지관리 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 4,846백만원(시비)

◦ 사업내용

▸노후 포장도로 유지관리	1,306백만원

- 파손도로 소파보수 및 절삭포장(군도19호) : L=1.0km / 150백만원

- 도로변 제초작업, 지장수목제거 및 길어깨 도로정비	: L= 1,020km / 180백만원

- 용안사거리 일원 아스콘포장	: L= 0.6km   / 100백만원

- 증보들길 아스콘포장	: L=2.5km    / 300백만원

- 춘포로 아스콘포장	: L=1.2km    / 192백만원

- 주현로55~주현로5길22 아스콘포장	: L=0.2Km   /  30백만원

- 중앙로5길 이리여고 앞 아스콘포장	: L=0.2km    /  30백만원

- 염수분사장치 설치(특별교부세_모현대교, 군도15호) : 2개소      / 324백만원

▸노후 인도 보수 및 정비	3,540백만원

- 시내주요도로 노후인도 정비              : L= 1.5km / 200백만원

- 신동로 보도정비                            : L = 1.2km   / 50백만원

- 선화로3길(모현동행정복지센터~원광여중)보행로정비  : L = 1.2km  / 200백만원

- 신흥정수장~신흥삼거리 보도개설            : L = 0.8km  / 320백만원

- 번영로8길(평화제일아파트) 보도개설         : L = 0.5km  / 200백만원

- 우정원룸앞 보도개설                        : L = 0.4km  / 200백만원

- 함열10길(정동오거리~와리공원)보도정비     : L = 0.2km  / 100백만원

- 영등동 보람주유소~영등초등학교 보도정비   : L = 0.3km  / 150백만원

- 용안사거리~용안중 보도정비               : L = 0.3km  / 60백만원

- 푸른솔공원 보도정비                       : L = 0.2km  / 50백만원

- 하나로 상징거리 보수                      : L = 1.0km  / 560백만원

- 영등동 가로환경정비사업                    : L = 1.8km / 1,450백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 노후 포장도로 유지관리(1,066백만원)	공정률 82%

▸파손도로 소파보수 및 절삭포장 등 5건 완료     : L=5.3km

▸염수분사장치 설치(모현대교, 군도15호) 완료    : 2개소

◦ 노후 인도 보수 및 정비(760백만원)	공정률 22%

▸시내주요도로 노후인도 정비 등 6건 완료        : L=3.4km

□ 하반기 추진계획

◦ 노후 포장도로 유지관리

▸도로변 제초작업, 길어깨 도로정비 마무리(180백만원)   : 2022.  7. ~ 10.

▸노후도로 소파보수 및 재포장 추진(60백만원)	: 2022.  7. ~ 10.

◦ 노후 인도 보수 및 정비(1,130백만원)	: 2022.  7. ~ 12.

▸하나로 상징거리 보수 외 3건

3		영등동 가로환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 6. ~ 12.

◦ 위    치 : 우남샘물타운사거리~전자랜드사거리

◦ 총사업비 : 3,000백만원(특별교부세 900, 시비 2,100)

◦ 사업내용

▸보도정비 L=1,800m 및 경관개선 1식

▸보행연속성확보(고원식 횡단보도), 영등육교 하부공간 특화,

기존 버스정류장 개선, 야간특화 고보조명 · 보도조명 설치,

중앙분리대 수목 보식 및 간접 조명 설치

□ 상반기 추진실적

◦ 용역 협상 계약 추진	: 2021.  8. ~ 11.

◦ 실시설계용역 착수 및 주민설명회 실시                        : 2021. 11. ~ 12.

▸주요내용 : 사업개요 설명 및 의견 수렴 등

◦ 설문조사 실시                                              : 2022.  1. ~ 3.

▸주요내용 : 지역 주민(영등1․2동, 어양동, 상가번영회) 요구 사항 청취

- 노후화 보도 정비, 도로 환경 개선

◦ 주민설명회 실시                                             : 2022.  1. ~ 3.

▸주요내용: 설문조사 등 주민 의견 반영 사항 설명

◦ 행정절차 추진                                               : 2022.  4. ~ 6.

▸디자인 심의, 실시설계 등

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계, 계약심사                                          : 2022.  7.

◦ 공사 발주                                                   : 2022.  7.

◦ 공사 완료                                                   : 2022. 12.

4		교량 및 시설물 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 위    치 : 교량, 육교 및 도로 부속시설물

◦ 총사업비 : 2,492백만원(특별교부세 700  도비 9 시비 1,783)

◦ 사업내용

▸교량 및 보도육교 유지관리	2,035백만원

- 시설물 안전법 대상시설물 안전점검(정밀,정기): 68개소 / 75백만원

※ 1,2종(11개소) 정밀점검 및 진단, 3종(57개소) 정기점검

- 모현대교 보수보강 및 송학교 내진·보수보강    : 2개소 /1,450백만원

- 지하차도 및 교량 시설물 유지보수	: 1개소 /   20백만원

- 동연,삼바레기 지하차도 신축이음보수	: 2개소 /   30백만원

- 교량 및 보도육교 유지관리 및 보수	: 4개소 /  160백만원

- 신동육교 엘리베이터 설치공사	: 1개소 /  300백만원

▸도로 부속시설물 보수 및 정비	457백만원

- 노후 도로표지판 유지보수	:  45백만원

- 도로 부속시설물 유지보수(볼라드, 가드레일, 방호울타리 등)	: 412백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 교량 및 보도육교 유지관리

▸시설물 안전법 대상시설물 상반기 정기안전점검 완료(20백만원) : 2022. 6.

▸하나로지하차도, 모현육교 정밀안전진단 완료(30백만원)     : 2022. 6.

▸송학교 내진보강 및 보수보강공사 완료(900백만원)       : 2021. 11.~ 2022. 6.

▸모현대교 보수보강공사 완료(550백만원)                 : 2021. 11.~ 2022. 6.

▸지하차도 및 교량 시설물 유지보수(20백만원)        : 2022. 5.

- 지하차도 및 육교 청소 용역 완료

▸교량 및 보도육교 유지보수(27백만원)               : 2022. 1.~ 2022. 6.

- 메시형울타리 구입 등

◦ 도로 부속시설물 보수 및 정비(400백만원)

▸도로 부속시설물(볼라드), 안전휀스, 도로표지판 정비

□ 하반기 추진계획

◦ 교량 및 보도육교 유지관리

▸시설물 안전법 대상시설물 하반기 정기안전점검(25백만원)	: 2022. 7. ~ 12.

▸동연, 삼바레기 지하차도 신축이음보수                   : 2022. 7.

▸교량(육교) 유지관리 및 보수(133백만원)	: 2022. 7. ~ 12.

▸신동육교 엘리베이터 설치공사 준공	: 2022. 7.

◦ 도로 부속시설물 보수 및 정비(57백만원)	: 2022. 7. ~ 12.

5		생활여건개선을 위한 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사업대상 : 201건

▸소규모 주민숙원사업 : 함열읍 미력2마을 안길정비공사 외 103건

▸마을안길 노후도로정비 : 함열동지하 마을안길 노후도로 정비 외 78건

▸지역밀착형참여사업(마을안길) : 오산리 마을안길 아스콘 덧씌우기외 16건

▸숭모공원~석치마을간 도로확포장공사 1건

◦ 사 업 비 : 4,507백만원(도비 320 시비 4,187)

▸소규모 주민숙원사업	: 1,143백만원

▸마을안길 노후도로정비	: 2,944백만원

▸지역밀착형참여사업(마을안길)	:  320백만원(도비 320)

▸숭모공원~석치마을간 도로확포장공사	:  100백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 생활여건개선을 위한 주민숙원사업 공사추진 및 완료 : 137건(68%)

▸소규모 주민숙원사업 : 함열읍 미력2마을 외 77건(75%)

▸마을안길 노후도로정비 : 함열읍 동지하마을 안길정비공사 외 50건(65%)

▸지역밀착형참여사업(마을안길) : 오산면 오산리 외 7건(47%)

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여 주민숙원사업 추진 및 사업 완료(64건, 32%)  : 2022. 7. ~ 12.

▸소규모 주민숙원사업 : 성당면 수산마을 외 25건(25%)

▸마을안길 노후도로정비 : 오산면 만상마을 외 27건(35%)

▸지역밀착형참여사업(마을안길) : 웅포면 오류도마을외 8건(53%)

▸숭모공원~석치마을간 도로확포장공사 (2공구 L=340m) 추진

6		가로환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사업위치 : 익산시 전역

◦ 사업내용

▸노점상 및 노상적치물 지도 단속 및 계도

▸불법 유동광고물 정비 및 과태료 부과

▸불법광고물 수거보상제 실시

▸시 지정 벽보판 철거

▸저단형 및 2단형 현수막 게시대 신규설치

□ 상반기 추진실적

◦ 불법 노점상 및 노상 적치물 정비 : 노점상 2,333건, 적치물 2,521건

◦ 불법 유동광고물 정비 : 현수막 14,646건, 입간판・전단 등 1,891건

◦ 불법 유동광고물 과태료 부과 : 3건 / 687백만원

◦ 불법광고물 수거보상제 추진

▸416,984건 수거 / 보상금 70백만원

◦ 시 지정 벽보판 철거 : 56개소 111면

◦ 현수막 게시대 신규설치

▸저단형 4기 7면 / 2단형 6기 24면

□ 하반기 추진계획

◦ 불법 노점상, 노상적치물 및 유동광고물 지속적 정비 추진

◦ 연립형 게시대 상판교체 및 신규설치               : 2022. 7. ~ 12.

7		간판 개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 황등로거리 간판개선사업 외 2건

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,250백만원(당해 650백만원, 명시 600백만원)

◦ 사업위치 : 익산시 관내 일원(황등면, 부송동, 평화동 공구거리 북측)

◦ 사업내용 : 사업 대상지 일원 오래된 간판을 정비하여, 지역 특성을 살리고 안전하고 품격있는 도시경관을 조성하고자 함

□ 상반기 추진실적

◦ 옥외광고물 등 정비시범구역 지정공고              : 2022.  1.  4.

◦ 옥외광고물 등 정비시범구역 고시(안) 행정예고     : 2022.  1. 19.

◦ 옥외광고물 등 정비시범구역 고시                  : 2022.  2.  9.

◦ 평동로 공구거리(북측) 간판개선사업 (공정률 100%)  : 2022.  4. ~ 6.

▸실시설계용역, 간판개선사업 추진(완료)

◦ 황등로거리 간판개선사업                             : 2022.  4. ~ 6.

▸실시설계용역 및 발주

◦ 부송로거리 간판개선사업	: 2022.  4. ~ 6.

▸실시설계용역 및 원가심사

□ 하반기 추진계획

◦ 황등로거리 간판개선사업 완료                    : 2022.  9.

◦ 부송로거리 간판개선사업 완료                     : 2022. 10.

8		자전거 이용 활성화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 녹색교통(재생자전거) 만들기 사업

▸사업기간 : 매년 3월 ~ 11월(혹서기 제외)

▸위    치 : 자전거 보관소(목천동660-12)

▸주요내용 : 방치·폐자전거 수거 및 수리, 저소득층 및 사회단체 기증

- 일자리정책과 지역공동체 일자리 사업 인력 활용(4~6명)

◦ 자전거 대여소 운영

▸사업기간 : 매년 3월 ~ 11월(주말 및 공휴일 운영)

▸위    치 : 2개소(웅포 곰개나루 관광지, 만경강 사수정 일원)

▸주요내용 : 재생자전거를 이용한 자전거 타기 문화 확산

- 자전거 무료대여(각 50대 운영), 기간제 인력 활용(4명)

◦ 자전거 이용시설 정비사업

▸기간/규모 : 매년 1월 ~ 12월 / 자전거도로 116개 노선 L=178km

▸주요내용 : 자전거도로 및 자전거 이용시설 유지관리

- 자전거 이용시설 및 관련 시설물 유지보수 공사(200백만원)

- 금마사거리~백제왕궁 자전거길 조성사업(300백만원)

- 중앙육교 인근 자전거도로 정비공사(90백만원)

- 자전거 이용활성화 계획(변경) 수립 용역(100백만원)

◦ 익산시민 자전거 보험 운영

▸사업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 3.

▸주요내용 : 익산시민 대상 자전거 보험 가입(158백만원)

- 보장내용(사망, 후유장해, 4주이상 진단, 교통사고 처리 지원 등)

◦ 자전거 안전교육 운영

▸기간/위치 : 2022. 4. ~ 11. / 관내 초등학교

▸주요내용 : 자전거 안전에 대한 이론 및 실기 교육 실시

□ 상반기 추진실적

◦ 녹색교통(재생자전거) 만들기 사업

▸방치․폐자전거 수거            : 288대(무단방치 3, 아파트수거 285)

▸재생자전거 생산                :  78대

◦ 자전거 대여소 운영

▸기간제 인력 채용(웅포 2명, 만경강 2명)	: 2022. 3.

▸웅포 및 만경강 자전거 대여소 운영	: 2022. 4. ~ 6.

- 대여 실적 : 5,017대(만경강1,463/웅포3,554)

◦ 자전거 이용시설 정비사업

▸익산시 자전거도로 유지보수 추진

- 자전거도로 및 조명등 유지보수(단가계약) 추진 : 2022. 4. ~ 6.

▸금마사거리~백제왕궁 자전거길 조성사업

- 자전거길 조성사업 1차분 추진                : 2022. 1. ~ 6.

▸중앙육교 인근 자전거도로 정비공사

- 중앙육교 인근 자전거도로 정비공사 착공      : 2022. 5.

▸자전거 이용활성화 계획(변경) 수립 용역

- 자전거 이용활성화 계획(변경) 수립 용역 착공 : 2022. 3.

◦ 자전거 보험 운영

▸2022년 자전거 보험(용역) 계약	: 2022. 3. ~ 2023. 3.

- 계약자 : DB손해보험(주) / 계약금액 : 153백만원

- 보험금 지급(5월말 기준) : 33건 15백만원

◦ 자전거 안전교육 운영

▸안전교육 강사 계약체결	: 2022. 5.

▸자전거 안전교육 운영	: 2022. 6.

- 교육 실적 : 용북초, 이리팔봉초 교육완료 (58명)

□ 하반기 추진계획

◦ 방치․폐자전거 수거, 재생자전거 생산 및 기증    : 2022.  7. ~ 11.

◦ 자전거 대여소(웅포, 만경강) 운영	: 2022.  7. ~ 11.

◦ 자전거 이용시설 정비사업 추진	: 2022.  7. ~ 12.

◦ 자전거 안전교육 운영	: 2022.  7. ~ 11.

◦ 자전거 라이딩 행사 추진	: 2022. 10. ~ 11.