2022.  7.

제244회 익산시의회(임시회)

― 2022 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	환경안전국

시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 상반기 성과 및 반성
□	2022 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전예방 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 CCTV 운영을 통한 시민중심의 안전망 구축

일  반  현  황

□ 기          구

						시민안전과
안전총괄			사회재난				자연재난			방재시설				민 방 위			CCTV

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24		1	6	7	5	5
현 원	25		1	7	6	2	9
증 감	1			1	△1	△3	4

□ 사  무  분  장

◦ 안전관리계획 수립, 중대재해예방 업무 추진, 안전신문고 운영, 시민안전보험, 재난관리기금, 재난분야 위기관리매뉴얼 관리, 재난안전상황실, 안전문화교육, 재난배상책임보험 등

◦ 재난안전통합지원본부 운영(사회재난), 재난대응 안전한국훈련, 유‧도선사업, 승강기 보수업 등록 및 관리, 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설 관련 등

◦ 재난안전통합지원본부 운영(자연재난), 배수펌프장 및 배수문 유지관리, 가뭄‧한파‧폭염 종합대책, 자연재난 사전대비, 예‧경보시설, 그늘막 관리 등

◦ 사전재해영향성 검토 우수저류시설 사업, 재해 예방 및 복구 사업, 자연재해위험지구 정비사업, 급경사지 관리, 소규모위험시설 취합 등

◦ 국가기반체계 보호 및 비상대비관련, 을지‧화랑‧충무훈련, 충무계획, 민방위 시설 및 장비관리, 통합방위협의회 운영, 민방위 기본계획 수립, 사회복무요원관리 등

◦ 통합관제센터용 CCTV 설치 및 유지보수 관리, 마을방범용 CCTV 설치 및 유지보수 지원, 통합관제센터 모니터링 용역관리 등

□ 방재시설 및 재해취약시설(지구) 현황

구 분	계	배 수 펌프장	수 문	게이트 펌 프	대규모 공사장	산사태	인명피해 우려지역
개소	78	9	11	1	10	30	17

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	18개소	-	102개소	6개소	36개소	15,425점

□ CCTV 설치 현황

구 분	총 계	통합관제센터 관리					자체관리 (마을방범용)
		소 계	방범용	차량번호 판 독 용	아동용	어 린 이 보호구역
개소	1,573	896	592	101	83	120	677
대수	5,424	2,788	2,046	138	173	431	2,636

□ 위원회 현황

위원회명	구 성	근 거	비고
안전관리위원회	15명 (당연15)	익산시 안전관리위원회의 구성 및 운영에 관한 조례	1회 개최
재난관리기금 운용심의위원회	9명 (당연6, 위촉3)	익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례	4회 개최
안전관리민관 협력위원회	19명 (당연7, 위촉12)	익산시 안전관리민관협력위원회 구성 및 운영 조례	대규모 재난 발생시 개최
재해영향평가 심의위원회	17명 (당연2, 위촉15)	익산시 재해영향평가심의위원회 구성 및 운영 규칙	2회 개최

2022 예산집행실적

【 2022. 6. 30. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책		단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
시민안전과						51,229,736	14,639,168	36,590,568	28.6%
		재해및재난예방				44,816,297	9,737,280	35,079,017	21.7%
				인적재난예방사업운영		7,026,060	6,397,905	628,155	91.1%
					재난대응종합훈련	29,300	15,400	13,900	52.6%
					국가재난대응종합훈련	5,790	0	5,790	0%	9~10월 훈련 추진 (10월 중 집행)
					재난관리시설물안전점검	81,000	47,290	33,710	58.4%	용역 진행중 (10월 완료)
					안전도시 만들기	46,872	33,825	13,047	72.2%
					안전도시만들기(보조)	77,910	77,910	0	100%	사업완료
					코로나19행정명령이행시설 재난지원금지급	6,785,188	6,223,480	561,708	91.7%	사업완료
				자연재난예방사업운영		346,473	173,672	172,801	50.1%
					배수장,수문유지관리	250,473	125,513	124,960	50.1%
					배수장,수문유지관리지원	87,000	45,800	41,200	52.6%
					풍수해보험	9,000	2,359	6,641	26.2%	보험료 납부시기 미도래
				재해재난대비사업운영		402,388	112,100	290,288	27.9%
					재해재난예방및복구지원	288,581	68,309	220,272	23.7%	공공요금 월별집행 자연재난 피해자 미정
					자율방재단운영관리	37,497	2,623	34,874	7%	7~8월 사업추진 (예찰활동, 교육)
					자율방재단운영관리(보조)	20,150	9,450	10,700	46.9%	보험 가입시기 미도래(11월)
					재난종합상황실운영	46,060	21,767	24,293	47.3%	월별 집행 (여비 등)
					재난안전통신망단말기구입	10,100	9,951	149	98.5%	사업완료
				승강기 안전관리		10,000	0	10,000	0%
					승강기 안전관리개선	10,000	0	10,000	0%	7~8월 훈련 예정 (7월 중 집행)
				재해위험·취약지역정비		37,031,376	3,053,603	33,977,773	8.2%
					우수저류시설 설치(보조)	8,785,620	2,028,272	6,757,348	23.1%	장기계속사업 ‘23.6. 준공예정
					재해위험지역정비(보조)	22,386,619	451,314	21,935,305	2%	계속사업 용역 준공시기 미도래
					급경사지정비사업(보조)	5,561,670	455,982	5,105,688	8.2%	계속사업 용역 준공시기 미도래
					재해위험지역정비	297,467	118,035	179,432	39.7%	자연재해저감종합계획 준공시기 미도래

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	안전총괄관리			3,216,543	2,343,173	873,370	72.8%
		안전관리		3,216,543	2,343,173	873,370	72.8%
			CCTV 통합관제센터 운영및유지관리	2,049,543	1,227,591	821,952	59.9%
			방범용CCTV설치지원	440,000	394,366	45,634	89.6%
			읍면동방범용 CCTV설치	727,000	721,216	5,784	99.2%	사업완료
	민방위운영			963,439	328,845	634,594	34.1%
		민방위대관리		963,439	328,845	634,594	34.1%
			국민참여민방위의날 훈련경비	7,050	0	7,050	0%	코로나19로 인한 훈련 취소
			국민참여민방위의날훈련경비(보조)	1,900	1,900	0	100%	사업완료
			을지연습운영	18,338	2,208	16,130	12%	하반기 훈련 실시
			민방위화생방 방독면보급	1,200	1,200	0	100%	사업완료
			민방위시설·장비유지보수	27,865	16,050	11,815	57.6%
			민방위교육훈련 및 시설장비확충	3,000	3,000	0	100%	사업완료
			민방위교육훈련 및 시설장비확충(보조)	11,820	1,620	10,200	13.7%	비대면 사이버교육으로 대체
			사회복무요원관리 (사회서비스분야인력경비)	819,470	252,226	567,244	30.8%	급여 월별집행
			의용소방대지원	17,500	5,000	12,500	28.6%	하반기 행사시 지급예정
			민방위교육운영비 (보조)	15,296	5,700	9,596	37.2%	사이버교육 11월 완료 후 지급예정
			민방위경보사각지역해소(보조)	40,000	39,941	59	99.9%	사업완료
	재무활동			2,200,000	2,200,000	0	100%
		내부거래지출		2,200,000	2,200,000	0	100%
			내부거래지출	2,200,000	2,200,000	0	100%	사업완료
	행정운영경비			33,457	29,870	3,587	89.3%
		기본경비		33,457	29,870	3,587	89.3%
			기본경비	33,457	29,870	3,587	89.3%

2022 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 코로나19 대응 추진

‣코로나19 대응 익산시 재난안전대책본부 운영 및 사회적 거리두기 시행

‣자가격리자 구호물품 및 방역물품 지급	: 15,650세트(건)

‣행정명령 이행시설 재난지원금 및 사각지대 재난지원금 지급  : 9,650개소

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역

‣정기안전점검 19개소, 정밀안전점검 10개소

◦ 안전도시 만들기 위한 재해예방 사업 추진

‣인화지구 우수저류시설 설치공사 추진	: 공정률 70%

‣재해위험개선지구 정비사업 추진 : 4개소(석천대, 석탄, 여산, 판문)

‣급경사지 정비사업 추진 : 4개소(송천, 성당, 아리랑, 용두산)

‣자연재해저감 종합계획 재수립용역 추진

◦ 시민의 생명과 재산보호를 위한 용도별 CCTV 설치	: 82개소 244대

‣통합관제센터 관리용	: 47개소 145대

‣마을자체 관리용	: 35개마을 99대

◦ 마을방범용 CCTV 유지보수 지원	: 94개마을  238대

□ 반      성

◦ 코로나19 상황으로 초‧중‧고 맞춤형 안전문화교육 활동 위축

‣초‧중‧고 맞춤형 안전교육 수요조사 실시          : 2022. 6.~7.

‣2022년 하반기 안전문화교육 재개 운영            : 2022. 9.~

2022주요업무 추진상황

		시민안전보험 및 안전사고 예방활동추진 국가안전대진단 추진 코로나19 대응 추진 화재 대피용 방연 마스크 구입 및 비치 제3종 시설물 지정 실태조사 용역 배수펌프장·배수문 정기·정밀안전검검 배수펌프장‧배수문 유지보수 재난재해예방 시설물 유지관리 용역 인화지구 우수저류시설 설치공사 석탄 재해위험개선지구 정비사업 여산 재해위험개선지구 정비사업 판문 재해위험개선지구 정비사업 급경사지 정비사업 국가 비상대비훈련 및 실용적 민방위훈련 CCTV통합관제센터 운영 및 용도별 CCTV 설치

1		시민안전보험 및 안전사고 예방활동 추진

□ 사 업 개 요

◦ 익산시 시민안전보험

▸가입대상 : 익산시에 주소를 둔 시민(외국인 포함)

▸보장내용 : 사망 및 후유장해 정도에 따라 결정(15개 항목)

- 사망/후유장해 (10) : 폭발‧화재‧붕괴, 대중교통이용, 강도, 뺑소니‧무보험차, 농기계사고

- 사      망 ( 3) : 자연재해, 익사사고, 감염병

- 부상치료비 ( 2) : 스쿨존 교통 상해 부상치료비, 개물림사고 응급실 내원 치료비

▸보장금액 : 보장내용에 따라 최대 1천만원 한도

◦ 안전사고 예방을 위한 안전활동 추진

▸기    간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

▸사업내용 : 맞춤형 안전문화교육 및 안전점검의 날 행사 운영

□ 상반기 추진실적

◦ 익산시 시민안전보험 가입 및 홍보                     : 2022. 3.

▸보장기간 : 2022. 3. ~ 2023. 2.

▸사 업 비 : 110백만원(도 23, 시 87)

▸작년과 달라진 점 : 2개 항목 추가

- 뺑소니‧무보험차 후유장해, 개물림사고 응급실 내원 치료비

▸홍보추진 : 리플렛 배부(4,000부), 내고장 소식지, 시 홈페이지 게재 등

◦ 시기별‧테마별 안전점검의 날 운영	: 2022. 3.~6.

▸2022. 3. : 개학기 학교주변 위해요인 안전점검(관내 초등학교 3개소)

▸2022. 4. : 다중이용시설 안전점검(익산역)

▸2022. 5. : 행락철 유원지 주변 안전점검(운동시설 및 체육공원)

▸2022. 6. : 여름철 호우, 태풍 대비 방재시설 점검(배수펌프장)

◦ 초‧중‧고 맞춤형 안전교육 수요조사 실시	: 2022. 6.~7.

□ 하반기 추진계획

◦ 안전점검의 날 실시                                   : 매월 4일

◦ 초‧중‧고 맞춤형 안전교육 운영                        : 2022. 9.~

2		국가안전대진단 추진

□ 추 진 개 요

◦ 추진목적 : 세월호 침몰사고('14.4.) 등 대형사고  발생에 따른 안전 사회에 대한 국민적 요구로 2015년 이후 매년 민관합동 안전점검 실시

◦ 추진기간 : 2022. 8. 22. ~ 2022. 10. 21.(61일간)

◦ 점검대상 : 최근 사고 발생시설, 국민관심 분야 등

▸관내 건축시설, 교통시설, 생활 및 여가, 문화재, 환경 및 에너지, 기타 시설

◦ 사 업 비 : 20백만원(재난관리기금)

◦ 점검내용 : 시설물의 구조적 안전성, 안전관리실태, 법·제도 등

◦ 점검방법 : 민·관 합동점검(공무원, 유관기관, 민간전문가)

□ 상반기 추진실적

◦ 2022년 국가안전대진단 점검대상시설 선정

▸총 87개소 선정(부처 위임시설 총 15개소, 지자체 자체선정 총 72개소)

◦ 2022년 재난관리 전문교육(국가안전대진단 관련) 과정 수료(5.12.~13.)

▸집합교육, 시 담당자 2명

□ 하반기 추진계획

◦ 2022년 국가안전대진단 세부 추진계획 수립	: 2022. 7.

▸점검대상시설 확정, 점검 방법, 홍보 방안 등

◦ 민관합동점검 기동반 구성	: 2022. 8.

▸공무원, 유관기관, 민간전문가(건축, 소방, 전기, 가스 등)로 구성

◦ 2022년 국가안전대진단 추진(민관 합동점검 및 현장점검)	: 2022. 8. 22.~10. 21.

◦ 2022년 국가안전대진단 결과 분석 및 후속조치 강화  : 2022. 11.~12.

▸점검결과 공개, 후속조치 이행확인 등

3		코로나19 대응 추진

□ 추 진 개 요

◦ 확진자(6.15.기준) : 전국 18,248,479명(인구의 35.6%), 전북 602,781명       (33.9%), 익산 92,668명(33.5%)

◦ 코로나19 대응 익산시 재난안전대책본부 운영 및 사회적 거리두기 시행

▸행정명령 단계별 방역수칙 대시민 홍보(운영시간, 사적모임, 행사·집회, 기타 등)

▸공공 ⸱ 다중이용시설 및 유관기관 방역대책 수립 및 관리

◦ 코로나19 재난지원금 및 확진자 구호물품 등 지원

□ 상반기 추진실적

◦ 코로나19 방역 컨트롤 타워 재난안전대책본부 운영

▸중앙재난안전대책본부 영상회의 참석, 방역추진상황 총괄관리

▸거리두기에 따른 공공시설 운영‧중단 조정 및 생활방역수칙 대시민 홍보 등

◦ 다중이용시설 방역수칙 준수 현장 점검 및 방역관리

▸시설별 방역수칙 현장 점검	: 47개 업종, 8,666개소

▸현장 지도․점검 및 방역수칙 위반 행정처분	: 207건(지도 204건, 과태료 3건)

◦ 코로나19 행정명령 이행시설 재난지원금 및 사각지대 재난지원금 지급

▸코로나19 행정명령 이행시설 도 재난지원금(개소당 800천원)	: 7,786개소, 6,229백만원

▸코로나19 지원 사각지대 재난지원금(개소당 600천원)	: 1,864개소, 1,118백만원

◦ 구호물품 및 방역물품 지급

▸자가격리자 구호물품 지급	: 15,650세트(건), 633백만원

▸코로나 취약계층 방역물품 지원(마스크, 소독제 및 자가진단키트 등)

□ 하반기 추진계획

◦ 코로나 신종 변이 및 재유행 대비 대응체계 마련

▸가을철 코로나 재유행 및 신종 변이 확산 방지 대응체계(재난 컨트롤 타워) 유지

▸확진자 구호․방역 물품 구입 등을 위한 예산 확보

4		화재 대피용 방연 마스크 구입 및 비치

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 화재 취약계층 이용시설에 방연마스크 ⃰ 비치로 긴급상황

발생시 인명사고 최소화

* 화재시 연기로부터 기도를 보호하기 위해 방연필터가 내장된 대피용 마스크

◦ 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 11.

◦ 사 업 비 : 16백만원(시비)

◦ 사 업 량 : 방연마스크 1,400장(보관함 70개 포함)

◦ 비치장소 : 14개소(장애인․노인종합복지관 등)

※개소당 20~300장 비치

◦ 관련법령 :「익산시 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원 조례」

□ 상반기 추진실적

◦ 화재 대피용 방연마스크 구입 및 비치 계획 수립	: 2022. 3.

◦ 화재 대피용 방연마스크 소요량 조사	: 2022. 3.

▸화재 취약계층 관련부서 : 복지정책과, 경로장애인과, 아동복지과, 여성청소년과

◦ 화재 대피용 방연마스크 구입 및 보급	: 2022. 4.~5.

□ 하반기 추진계획

◦ 화재 대피용 방연마스크 사용현황 점검 및 관리	: 2022. 6.~11.

◦ 화재 대피용 방연마스크 관련 만족도 조사	: 2022. 11.

5		제3종 시설물 지정 실태조사 용역

□ 조 사 개 요

◦ 조사목적 : 제1종, 제2종 시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물을 조사하여 제3종 시설물로 지정·고시 후 안전관리 추진

(제1종 시설물) 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물(ex. 21층 이상 건축물)

(제2종 시설물) 제1종 시설물 외에 재난을 예방하기 위해 계속적인 관리가 필요한 시설물(ex. 16층 이상 건축물)

◦ 조사기간 : 2022. 5. 4. ~ 2022. 10. 30.

◦ 조사대상 : 공동주택 및 건축물 124개소

▸공동주택 73개소, 종교시설 7개소, 병원4개소, 체육시설 1개소, 기타 39개소

◦ 사 업 비 : 42백만원(시비)

◦ 조사내용 : 시설물 현장조사 실시 후 안전등급(상태) 결정 및 안전관리 시행

◦ 추진근거

▸「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제8조

▸「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제100조

□ 상반기 추진실적

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역 발주	: 2022. 3.

▸공동주택 및 건축물 124개소

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역업체 선정	: 2022. 4.

◦ 제3종시설물 지정을 위한 안전상태 등급 산정 조사	: 2022. 5.~10.

◦ 2023년도 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 기본계획 수립	: 2022. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역 준공	: 2022. 10.

◦ 제3종시설물 지정·고시 및 시설물통합정보시스템(FMS) 입력 : 2022. 11.

6		배수펌프장‧배수문 정기‧정밀안전점검

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 시설물의 물리적·기능적 결함과 내재된 위험요인을 발견하고, 이에 대한 적절한 조치방안을 제시하여 시설물의 안전 확보

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 10.

◦ 사업대상 : 19개소(배수펌프장 9, 배수문 10)

◦ 총사업비 : 185백만원(도 26.1, 시 158.9)

‣정기안전점검 : 98백만원(시비)

‣정밀안전점검 : 87백만원(도 26.1, 시 60.9)

◦ 관련근거 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조

□ 상반기 추진실적

◦ 2022년도 상반기 정기안전점검 완료                     : 2022. 4.

▸점검대상 : 배수펌프장 9개소, 배수문 10개소

▸점검결과 : 전체 시설 등급 양호

▸점검방법 : 육안과 간단한 측정기기로 검사하여 시설물의 결함 손상 발견

◦ 2022년도 정밀안전점검 착수                            : 2022. 3.

▸점검대상 : 배수펌프장 7개소, 배수문 3개소

▸점검방법 : 외관조사 및 측정·시험 장비를 통한 정밀점검 시행

□ 하반기 추진계획

◦ 2022년도 하반기 정기안전점검 발주(배수펌프장 9개소)       : 2022. 7.

◦ 2022년도 정밀안전점검 완료                             : 2022. 9.

7		배수펌프장‧배수문 유지보수

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 시설물 보수보강을 통해 여름철 자연재난 즉각 대응 가능한 상태 유지

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업대상 : 21개소(배수펌프장 9, 배수문 11, 게이트펌프 1)

◦ 총사업비 : 35백만원

◦ 사업내용 : 노후 및 파손 시설물 수리 및 유지보수

▸기계 : 펌프, 수문 와이어 등 / 전기 : 배터리, 계전기, UPS 등

□ 상반기 추진실적

◦ 유천 및 목천배수펌프장 배터리 교체                  : 2022. 4.

▸사유 : 기존 설치된 배터리의 노후 및 파손

▸내용 : 유천(12V 120AH 9EA), 목천(12V 60AH 9EA) 배터리 교체

◦ 고잔배수펌프장 지수펌프 교체                        : 2022. 5.

▸사유 : 펌프 노후화로 인한 배수능력 저하

▸내용 : 10마력 집수정 유지관리용 지수펌프 1대(7톤/분) 교체

◦ 고잔배수펌프장 전기설비 증설                        : 2022. 5.

▸사유 : 지수펌프 교체에 따른 기존 전기설비용량 부족

▸내용 : 신규 전기분전함 및 전선으로 교체 / 신규 인버터로 교체

◦ 성당배수펌프장 기중차단기 교체                      : 2022. 5.

▸사유 : 기존 설치된 기중차단기의 노후로 인한 오작동

▸내용 : 신규 고압 기중차단기로 교체

□ 하반기 추진계획

◦ 시설물 수시 점검 및 시설물 보수·보강                  : 2022. 7.~12.

8		재난재해예방 시설물 유지관리 용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 시설물 유지관리 용역으로 여름철 자연재난 즉각 대응체계 유지

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업대상

▸무인경비용역 : 배수펌프장 5개소

▸전기안전관리대행 : 배수펌프장 6개소, 배수문 1개소, 우수저류시설 1개소

▸재해문자전광판 : 2개소

▸조기경보 및 자동음성통보시스템 : 조기경보 2지구, 자동음성 139개소

▸펌프장, 기상관측 CCTV : 54개소

▸기상관측장비 및 재난안전대책본부 홈페이지 : 기상관측 38개소, 홈페이지 1개

◦ 총사업비 : 100백만원

◦ 사업내용 : 재난재해예방 시설물 월간 및 수시 점검 등 유지관리

□ 상반기 추진실적

◦ 배수펌프장 무인경비용역(8백만원)                  : 2022. 1.

◦ 배수펌프장 전기안전관리대행용역(13백만원)         : 2022. 1.

◦ 재해문자전광판 유지보수용역(16백만원)             : 2022. 1.

▸중앙동, 영등2동 재해문자 전광판 2개소

◦ 조기경보 및 자동음성통보시스템 유지관리용역(18백만원)   : 2022. 1.

▸여산, 춘포 조기경보 2지구, 자동음성통보시스템 139개소

◦ 펌프장, 기상관측 CCTV 유지관리용역(18백만원)             : 2022. 1.

◦ 기상관측 및 재난안전대책본부홈페이지 유지관리용역(18백만원)  : 2022. 1.

□ 하반기 추진계획

◦ 시설물 유지관리용역 진행                            : 2022. 7.~12.

◦ 지속적인 점검을 통한 시설물의 안정성 유지 및 고장시 신속한 대응

9		인화지구 우수저류시설 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 동산동, 인화동 일원 도시 침수피해 예방을 위해 50년빈도 저류시설 설치(85mm/1시간, 120mm/2시간, 140mm/3시간)

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 6.

◦ 사업위치 : 익산시 주현동 203번지(1지구), 동산동 1048번지(2지구)

◦ 총사업비 : 23,000백만원(국 11,500, 도 3,450, 시 8,050)

▸기확보 사업비 : 20,900백만원(국 11,500, 도 3,450, 시 5,950)

▸2022년 사업비 :  2,100백만원(시 2,100)

◦ 사업내용 : 우수저류시설 설치 18,920㎥(인화1 : 8,570㎥, 인화2 : 10,350㎥)

□ 상반기 추진실적

◦ 공사 착공	: 2020. 4.

◦ 우수저류시설 설치공사 추진(공정률 70%)	: 2022. 1.~

▸1지구 : 저류조 터파기 완료, 바닥 공사 중

▸2지구 : 저류조 바닥 및 벽체 완료, 상부 공사 중

□ 하반기 추진계획

◦ 저류시설 공사 완료	: 2022. 12.

▸토목(저류시설 등), 건축(기계실 등), 기계(펌프 등), 전기(배전반)

◦ 조경 , 유출입관로, 부대시설	: 2023. 3.

◦ 우수저류조 시운전	: 2023. 4.

◦ 시설물 준공	: 2023. 6.

10		석탄 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 만경강 외수위 상승 시 목천포천 하류 저지대 침수 예방을 위해 유천배수펌프장 증설(현재 26.5톤/초 → 향후 56.5톤/초)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 석탄동 1016-91번지 일원

◦ 총사업비 : 25,000백만원(국 12,500, 도 5,000, 시 7,500)

▸기확보 사업비 : 9,500백만원(국 4,750, 도 1,900, 시 2,850)

▸2022년 사업비 : 7,400백만원(국 3,700, 도 1,480, 시 2,220)

▸2023년 이후   : 8,100백만원(국 4,050, 도 1,620, 시 2,430)

◦ 사업내용 : 펌프장 및 펌프 8대 설치, 배수로 정비 L=362m

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	및 추진(공정률 90%)	: 2020. 6.~

◦ 설계 경제성 검토(VE)	: 2022. 3.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: 2022. 5.

▸조건부 의결(계획대비 총사업비 증가에 따른 절감방안 검토 250억 → 300억)

◦ 사전설계검토 조치계획서 제출 및 설계서 보완	: 2022. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 전라북도 지방건설기술심의위원회 심의	: 2022. 7.

◦ 공사원가심사(전라북도)	: 2022. 7.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2022. 8.

◦ 공사 착공	: 2022. 10.

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

11		여산 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 강경천 외수위 상승 시 여산면소재지 일원 침수 예방을 위해 펌프장, 배수로, 우수관로, 하천정비 등 종합정비사업 시행

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 여산면 여산리 412-4번지(면소재지) 일원

◦ 총사업비 : 38,000백만원(국 19,000, 도 7,600, 시 11,400)

▸2022년 사업비 : 4,000백만원(국 2,000, 도 800, 시 1,200)

▸2023년 이후  : 32,000백만원(국 16,000, 도 6,400, 시 9,600)

◦ 사업내용 : 배수로 신설 L=350m, 우수관로 정비 L=4,800m, 펌프장 및 저류지 1개소(V=3,400㎥), 강경천‧유성천‧닭작골천 정비

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 및 추진(공정률 10%)	: 2022. 1.~

◦ 제1차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: 2022. 2.

◦ 제2차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: 2022. 3.

◦ 용역 착수보고	: 2022. 4.

□ 하반기 추진계획

◦ 제3차 주민설명회	: 2022. 7.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: 2022. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2023. 4.

◦ 공사 착공	: 2023. 6.

◦ 공사 준공	: 2025. 12.

12		판문 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 만경강 외수위 상승 시 춘포면 판문마을 저지대 일원 침수 예방을 위해 대장배수펌프장에 유량이 유입되도록 배수로 확장 및 설치

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 춘포면 용연리 529-5번지(판문마을) 일원

◦ 총사업비 : 4,000백만원(국 2,000, 도 800, 시 1,200)

▸2022년 사업비 : 1,000백만원(국 500, 도 200, 시 300)

▸2023년 이후   : 2,820백만원(국 1,410, 도 564, 시 846)

◦ 사업내용 : 수로정비 L=411m, 암거신설(5.0x1.5) L=150m,

우수관로 정비 L=534m

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	및 추진(공정률 90%)	: 2021. 5.~

◦ 사전설계검토 심의(전라북도)	: 2022. 4.

◦ 편입토지 분할측량	: 2022. 5.

◦ 사전설계검토 조치계획서 제출 및 설계서 보완	: 2022. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사원가심사(전라북도)	: 2022. 7.

◦ 실시설계용역 준공	: 2022. 7.

◦ 공사 착공	: 2022. 8.

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

13		급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 사면의 풍화작용으로 낙석‧붕괴가 발생되는 지구의 사면보강 및 낙석방지책 등의 설치를 통한 사면 안정화

◦ 송천지구 급경사지 정비사업

▸사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

▸사업위치 : 익산시 웅포면 송천리 산33-4, 산 131번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=7,000㎡(1지구 L=100m, 2지구 L=175m)

▸총사업비 : 2,000백만원[국(50%)1,000, 도(20%)400, 시(30%)600]

◦ 성당지구 급경사지 정비사업

▸사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

▸사업위치 : 익산시 성당면 성당리 503번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=1,000㎡(L=371.7m, H=1~3m)

▸총사업비 : 2,000백만원[국(50%)1,000, 도(20%)400, 시(30%)600]

◦ 아리랑지구 급경사지 정비사업

▸사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

▸사업위치 : 익산시 낭산면 낭산리 산 174-1번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=2,000㎡(L=320m, H=6m)

▸총사업비 : 4,000백만원[국(50%)2,000, 도(20%)800, 시(30%)1,200]

◦ 용두산지구 급경사지 정비사업

▸기    간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

▸위    치 : 익산시 용안면 용두리 산 5-2번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=7,500㎡(L=780m)

▸총사업비 : 10,000백만원(국 5,000, 도 2,000, 시 3,000)

□ 상반기 추진실적

◦ 송천지구 급경사지 정비사업

▸공사 착공 및 추진(공정률 30%)	: 2021. 10.~

- 2지구(송천마을) 추진 및 공사완료

- 경사면 구배완화(1:1.8) L=175m, 사면보호공(식생토 : T=4㎝) 5,281㎡,

산마루측구 L=201m, 횡배수관(⦽1,000m) 3개소

◦ 성당지구 급경사지 정비사업

▸공사 착공 및 추진(공정률 5%)	: 2021. 12.~

▸토지매입 지연에 따른 공사 일시중지	: 2022. 3.

▸실시계획 수립에 따른 주민 등 의견청취	: 2022. 4.

▸사업인정을 위한 중앙토지수용위원회 협의	: 2022. 6.

◦ 아리랑지구 급경사지 정비사업

▸실시설계용역 착수 및 추진(공정률 100%)	: 2021. 5.~

▸사전 설계검토 심의(전라북도)	: 2022. 2.

▸공사 원가심사(전라북도)	: 2022. 5.

▸실시설계용역 준공	: 2022. 6.

◦ 용두산지구 급경사지 정비사업

▸실시설계용역 발주	: 2022. 2.

▸실시설계용역 착수 및 추진(공정률 10%)	: 2022. 4.~

□ 하반기 추진계획

◦ 송천지구 급경사지 정비사업

▸1지구(송천마을)공사추진	: 2022. 7.~

- 경사면 구배완화(1:0.7) L=100m, 사면보강공(락볼트) 111공,

낙석방지책 L=101m, 낙석방지망 A=1,152㎡, 옹벽형측구 L=100m, H=2.0m

◦ 성당지구 급경사지 정비사업

▸실시계획 고시	: 2022. 6.

▸토지수용절차 이행	: 2022. 7.

▸공사 추진	: 2022. 11.

◦ 아리랑지구 급경사지 정비사업

▸공사 착공	및 추진	: 2022. 7.~

◦ 용두산지구 급경사지 정비사업

▸사전설계검토 심의(행정안전부)	: 2022. 10.

▸원가심사(전라북도)	: 2022. 12.

14		국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

□ 사 업 개 요

◦ 국가 비상대비 훈련 : 을지연습, 화랑훈련

◦ 민방위 대원 관리 : 14,257명 (2022.1.10.기준)

◦ 민방위 시설 관리 : 162개소

▸민방위 경보시설 18개소, 대피시설 102개소, 비상급수시설 42개소

□ 상반기 추진현황

◦ 비상대비 훈련

▸비상대비 훈련에 따른 통합방위지원본부 운영 2회

- 기간 : 3대대 혹한기 훈련(2.14.~2.17.), 전술훈련 평가(3.28, 3.30.)

- 내용 : 비상대비정보시스템을 활용한 메시지 처리 및 상황유지

◦ 민방위 편성 및 교육

▸민방위대원 편성(2022.1.10.기준) : 14,257명

- 1~4년차 대원 6,220명, 5년차 이상 대원 8,037명

▸민방위 사이버교육(본교육) : 2022. 4. ~ 2022. 6.

◦ 민방위 경보시설 신규 구축 : 1개소(오산면 행정복지센터 옥상)

◦ 민방위 비상급수시설 관정 사후관리 실시 : 1개소(부송공원)

※ 양수시설(수중모터펌프, 케이싱 배관 등)인양 후 고압 세척

◦ 민방위 장비 확충

▸지역민방위대 구급함 교체 : 140세트

▸민방위 기술지원대 휴대용 제독기 구입 : 3개

▸신규 비상대피시설 비상용품함 구입 : 6개

□ 하반기 추진계획

◦ 비상대비 훈련 실시                                  : 2022. 7.~8.

▸2022년도 합참의장 주관 화랑훈련(7.25.~7.29.)

▸2022년도 을지연습(8.22.~8.25.)

◦ 민방위 훈련 및 민방위 사이버교육(보충교육) 추진     : 2022. 7.~

15		CCTV통합관제센터 운영 및 용도별 CCTV 설치

□ 사 업 개 요

◦ 용도별 CCTV 설치

▸통합관제센터용(시설비)과 마을용(민간자본보조)으로 구분하여 설치

◦ CCTV 통합관제센터 민간위탁 운영

▸관제요원(12명/3조 2교대)이 24시간 모니터링하며 사건발생시 즉시 대응

◦ CCTV 및 통합관제센터 유지보수 관리

▸용역업체 직원 2명이 상주하여 관제시스템 및 CCTV 고장시 즉시 대응

□ 상반기 추진실적

◦ 용도별 CCTV 설치

(2022.6.30.현재, 개소/대수)

구 분	합 계	통합관제센터 관리					마을관리
		계	방범용	차량번호 판독용	아동용	어린이 보호용
연도별	1,573/5,424	896/2,788	592/2,046	101/138	83/173	120/431	677/2,636
2021.12.31.까지	1,491/5,180	849/2,643	556/1,915	90/124	83/173	120/431	642/2,537
‘22년 상반기 설치	82/244	47/145	36/131	11/14			35/99

◦ CCTV 통합관제센터 민간위탁 운영

▸위탁기간 : 2022. 2. ~ 2024. 1.(2년), 연도별 차수계약

- 총 계약(2년) : 1,184백만원(1차분 계약 : 2022. 2. ~ 2022. 12. / 547백만원)

▸위탁업무 : 24시간 모니터링하며 긴급사건 발생시 112 및 119등에 신고하여 대응

◦ CCTV 및 통합관제센터 유지보수 관리

▸계약사항 : 기간 - 2022. 1. ~ 2022. 12.(1년) / 금액 - 389백만원

▸관리업무 : 관제시스템(보안시스템, 네트워크 시스템 등) 및 CCTV 고장시 대응

□ 하반기 추진계획

◦ 용도별 CCTV 설치                               : 10개소 46대

◦ CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리             : 계속