2022.  9.

제246회 익산시의회(1차 정례회)

2022 행정사무감사

	환경안전국

늘푸른공원과

	□		감사자료 공통사항
			1.	2021 업무성과 및 반성 ………………………………	275
			2.	2021 예산집행 및 추진사항 …………………………	276
			3.	2021년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 ……	278
			4.	2021년도 감사시 지적사항 및 조치 결과 …………………	280
			5.	5분 자유발언 조치 결과 ………………………………	280
			6.	시정질문 조치 결과 ……………………………	281
			7.	의원 발의 조례 제·개정 후 추진현황 ……………	282
			8.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	282
			9.	2021년도 각종 민원 접수 및 처리내역 ………	285
			10.	기금 운용 관련 ……………………………………	287
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	287
			12.	용역사업 관련 ………………………………………	290
			13.	인․허가 민원처리 관련 사항 ………………………	295
			14.	각종공사 설계 변경상황 ……………………………	295
			15.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) …………………	298
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………………	301
			17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …………	302
			18.	지방보조금 성과평가내역 ………………………	303
			19.	2021년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 ………	303
			20.	2022년도 명시이월 내역 ……………………………	304
			21.	2022년도 명시이월(의회제출) 후 2021년도에 집행한 내역…	304
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 집행 현황 ……………	304
			23.	공사 준공기한 연장 내역 ……………………………	305

				24.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	305
				25.	국․도비 반납 현황 및 사유 ………………………	306
				26.	2021년도 계획사업 중 미착공사업 현황 …………	307
				27.	2021년도 계획사업 중 유보 및 취소된 사업현황 …	307
				28.	2021년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업 ………	307
				29.	2021년도 예산편성 후 전액 미집행 내역 ……………	308
				30.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황 ……………	308
				31.	소송 사건 현황 ……………………………………	308
				32.	시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ……	309
				33.	시설·사무 민간위탁 현황 …………………………	310
				34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황 ……	310
				35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황 …	310
				36.	시 산하 재단 설립 현황 …………………………	311
				37.	업무협약(MOU) 등 체결 현황 ……………………	311
	□		과 요구사항
				1.	가로수 조성 및 유지관리 …………………………	315
				2.	꽃향기 가득한 익산만들기사업 추진현황 ……	316
				3.	500만 그루 나무심기 사업 추진 현황 ……………	317
				4.	배산공원 조성사업 추진 현황 …………………	318
				5.	인화공원 조성사업 추진 현황 …………………	319
				6.	도시공원 및 녹지관리 추진 현황 …………………	320

감사자료 공통사항

1. 2021 업무성과 및 반성

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 성      과

◦ 500만 그루 나무심기 사업 원활한 추진

‣ 수목 식재 537,007주 (공공부문 409,511, 민간부문 127,496)

‣ 나무 나누어주기 사업 추진 35,033주(시민참여 7,000주, 공동체 28,033주)

‣ 【민간부문】익산시민 탄생기념 아가숲 조성, 내 나무심기 시민의 숲 조성 등

◦ 미세먼지 차단숲, 도시숲 조성 및 관리로 쾌적한 녹색도시 미관개선

‣ 미세먼지 차단숲 2개소(국가식품클러스터, 호남고속국도 주변 소나무 등 38,661주 식재)

‣ 석암동 도시숲 등 5개소(소나무 등 51,119주 식재)

‣ 원광중 학교숲 등 5개소(이팝나무 등 10,432주 식재)

◦ 가로수, 명품가로숲길 및 자녀안심 그린숲 조성으로 녹색네트워크 구축 추진

‣ 금강동 대간선수로 가로수 2km(이팝나무 187주, 회양목 14,010주 식재)

‣ 서부역사 진입로 2㎞(소나무 외 5종 56주, 꽃댕강 외 4종 7,895주 식재 등)

‣ 영만초 / 궁동초 자녀안심그린숲(황금사철 외 7종 6,864주 식재)

◦ 아름다운 도시경관 조성사업 추진

‣ 자연친화 감성 꽃거리 조성 : 익산역 등  4개소 꽃 조경시설 설치, 주요도로변 꽃식재

‣ 꽃향기 가득한 익산 만들기: 기관 및 학교 초화류 21만본 지원(3회)

‣ 전북대학교 솜리캠퍼스 꽃밭(5,000㎡) 및 시외구간 코스모스 꽃길조성(15km)

◦ 도시공원 조성사업 추진

‣ 배산공원: 진입로 평탄화, 노후 울타리 철거 및 메시 펜스 설치 준공, 침목계단 및 돌계단 재설치, 편백나무숲 데크계단 및 전망대 데크 설치, 산책로 휴식공간 조성중

‣ 인화공원: 무장애나눔길 조성(흙콘크리트 및 도막포장, L=1.3km, B=6.0m) 야간경관조명 설치 등

◦ 공원 시설물 안전관리 강화

‣ 어린이 놀이기구 안전관리: 안전점검 40개소(12회), 정기검사(24개소)

‣ 공원 내 공중화장실 불법 촬영 카메라 점검: 부송공원 외 51개소(12회)

‣ 어린이 놀이터 모래소독(기생충란, 중금속): 24개소(모래소독 5,475㎡ 2회, 모래보충 43㎥)

□ 반      성

◦ 사업추진 시 무단 경작, 불법 적치물, 간판 가림 등 이해관계에 따른 민원 발생

‣ 이해설득을 위한 지속적 협의 등의 적극적 행정 추진

◦ 시기별 민원 집중에 따른 신속 처리 지연

‣ 전지, 제초, 병해충 방제 등 사전 조치를 통한 민원 발생 최소화

2. 2021 예산집행 및 추진사항

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

【2021. 12. 31. 기준】	(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액						지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2021 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액	계속비 이월액	예비비 사용액
늘푸른공원과				12,702,772	12,488,486	0	214,286	0	0	11,381,231	1,310,033	358	11,150	89.6	이월포함 (99.9%)
	녹색환경도시조성			12,658,580	12,444,294	0	214,286	0	0	11,337,044	1,310,033	358	11,145	89.6
		도시림등 조성		8,817,193	8,602,907	0	214,286	0	0	8,817,110	0	0	83	99.9
			도시숲 유지관리	1,080,766	1,080,766	0	0	0	0	1,080,765	0	0	1	99.9
			미세먼지 차단숲 조성사업	1,884,000	1,884,000	0	0	0	0	1,884,000	0	0	0	100.0
			도시숲 조성사업(도시숲 조성)	1,414,286	1,200,000		214,286	0	0	1,414,286	0	0	0	100.0
			도시숲 조성사업(명상숲 조성)	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	100.0
			산림서비스도우미 운영 지원	42,250	42,250	0	0	0	0	42,250	0	0	0	100.0
			학교공원화 사업	11,500	11,500	0	0	0	0	11,500	0	0	0	100.0
			녹색일자리 확충	67,200	67,200	0	0	0	0	67,200	0	0	0	100.0
			수목양묘장 조성 및 관리	29,884	29,884	0	0	0	0	29,884	0	0	0	100.0
			꽃양묘장 관리 및 꽃조성	512,640	512,640	0	0	0	0	512,558	0	0	82	99.9
			가로화단 조성 및 관리	452,476	452,476	0	0	0	0	452,476	0	0	0	100.0
			중앙분리대 수목관리	128,660	128,660	0	0	0	0	128,660	0	0	0	100.0
			가로수 유지관리	416,129	416,129	0	0	0	0	416,129	0	0	0	100.0
			도시숲조성사업(가로수 조성)	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	100.0
			도로변 병해충	84,663	84,663	0	0	0	0	84,663	0	0	0	100.0
			생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	100.0
			녹색자금 지원사업	666,667	666,667	0	0	0	0	666,667	0	0	0	100.0
			꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기	601,072	601,072	0	0	0	0	601,072	0	0	0	100.0
			무궁화동산조성	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100.0
			스마트가든볼	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	100.0
			자녀안심그린숲	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100.0
		공원계획 및 조성		1,756,967	1,756,967	0	0	0	0	445,363	1,310,033	0	1,571	25.3	명시
			대규모도시숲, 명품가로숲 유지관리	30,000	30,000	0	0	0	0	28,429	0	0	1,571	94.8
			전라선 폐선부지 공원조성사업	125,167	125,167	0	0	0	0	125,167	0	0	0	100.0
			공원조성계획결정	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800	0	0	0	100.0
			배산공원 조성사업	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	289,967	1,310,033	0	0	18.1	참고1
		근린공원녹지관리		2,084,420	2,084,420	0	0	0	0	2,074,571	0	358	9,491	99.5
			공원녹지시설 유지관리	1,252,629	1,252,629	0	0	0	0	1,243,043	0	358	9,228	99.2
			공원녹지 수목 유지관리	831,791	831,791	0	0	0	0	831,528	0	0	263	99.9
	재무활동			4,057	4,057	0	0	0	0	4,052	0	0	5	99.9
		보전지출		4,057	4,057	0	0	0	0	4,052	0	0	5	99.9
			재무활동 (보전지출)	4,057	4,057	0	0	0	0	4,052	0	0	5	99.9
	행정운영경비			40,135	40,135	0	0	0	0	40,135	0	0	0	100.0
		기본경비		40,135	40,135	0	0	0	0	40,135	0	0	0	100.0
			기본경비	40,135	40,135	0	0	0	0	40,135	0	0	0	100.0

(참고) 2021년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부 진 사 유
1	배산공원 조성사업	1,600,000	289,967	18.1	‧특별교부세 추경예산 편성(8월) 후 행정절차 (계약심사) 이후 공사 추진이 늦어져 부득이 이월

3. 2021년도 행정사무감사시 지적사항 조치결과

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원관리계장		김진형	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	• 내 나무심기 사업 관련 ▸인화공원의 식재된 나무를 보면 가장 한가운데에 시장님 나무가 있고 그 주위로 당시 국장님들의 나무가 있는데 시민의 숲으로 정했으면 시민이 주인답게 위치해야 하는데 앞으로 반영하여 주시기 바람	▸인화공원은 2019년 시민의 숲 조성사업 원년에 민간참여 붐 조성을 위하여 간부공무원들의 기부가 주를 이루어 조성된 곳이며, 2021년 시민의 숲 나무 식재는 참여 시민이 원하는 위치에 신청을 받아 배정하고 있음.
2	• 도시숲 조성사업 관련 ▸국가산업단지 도시숲 조성사업 계획대로 추진해 주시기 바람	▸익산국가산업단지 도시숲 조성사업은 신성장동력과에서 환경영향평가가 진행 중인 부지로, 환경영향평가 완료 후 연내 추진할 계획임.
3	• 행정사무감사 자료 관련 ▸민간보조금사업계획서 및 정산서 별지 자료가 부족하니 다음 행정사무감사부터는 자료 보충 바람	▸자료 보충 후 기제출 완료하였으며, 추후 자료 제출에 철저를 기하겠음.
4	• 가로수 조성 관련 ▸가로수 보식이 필요하며 특색있는 가로수길을 만들 수 있도록 노력해주시기 바람	▸가로수 결주지에 대하여는 가을철 수목 식재 시기에 가로경관 이미지 통일을 위해 기존 식재된 수종으로 보식 하였음 ▸특색있는 가로수길은 도시림등의 조성 및 관리계획에 의거, 가로유형별로 적용 가능한 수종을 선정하여 조성할 계획임
5	• 공중화장실 설치 및 유지관리 관련 ▸공원 내 공중화장실 청소를 철저해주시기 바라며, 화장실 신축 시 남‧녀 화장실을 별개로 설치하여 주시기 바람	▸공원(녹지) 환경정비 기간제근로자(8명)를 사역하여 매일 1~2회 공원(녹지) 환경 정비를 실시하고 있음 ▸화장실 신축 시 남‧녀 화장실을 분리하여 추진하겠음
6	• 행정사무감사 자료 관련 ▸행정사무감사 자료 작성 시 예산액 등을 철저히 확인하여 작성해 주시기 바람	▸자료 작성에 철저를 기하겠음
7	• 익산시 도시림등의 조성관리 심의위원회 운영 관련 ▸500만 그루 나무 심기 사업 추진 시 심의위원회를 상시적으로 활용하여 주시기 바람	▸미세먼지 차단숲 등 대규모 사업의 경우에 위원회를 개최하고 있으며, 수시로 사업추진 시 도시림등의 조성ㆍ관리심의위원회의 자문을 반영하여 추진할 계획임
8	• 도시공원 및 녹지관리 관련 ▸화장실 점검 시 점검표 확인 철저히 해주시기 바람	▸관내 공원 52개소에 점검표 {화장실 청소 점검표(남,여), 불법 촬영 카메라 점검표(여)}가 부착되어 있으며 정기적으로 점검하고 있음

4. 2021년도 감사시 지적사항 및 조치결과

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	공원조성계장		정 웅	□

발언 의원 / 발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
최종오 의원 / 제233회 익산시 임시회 (2021.1.13. 제1차 본회의)	∙시민들의 의견을 반영하여 배산공원을 명품공원으로 도약	▸배산공원 조성을 위한 실시설계 시 시민들의 의견을 고려하여 산책로 및 휴게편의시설 등 정비하였고 추가 필요한 시설물 조성 및 정비를 위해 추경예산 편성하여 추진할 계획임

6. 시정질문 조치 결과

연번	시정질문	조치(처리)결과	비고
1	•옥상녹화사업과 반려식물 지원사업 활성화	▸익산시 건축물 옥상녹화 등 지원 조례가 제정되어 수요조사를 통하여 사업 추진하겠음 ▸반려식물 지원사업은 나무 나누어주기 사업과 함께 3월에 추진하였음
	•특색있는 가로수 조성을 위한 「익산시 가로수 종합계획」 필요	▸2017년 도시림등의 조성 및 관리계획과 2019년 500만 그루 나무심기 종합계획을 수립하여, 특색있는 가로경관 연출을 위해 가로유형별 적용 가능한 가로수 수종을 선정하고, 가로경관 이미지를 통일하여 식재하고 있음
2	•신흥공원 개발 계획에 대하여	▸신흥근린공원 내 중앙체육공원, 익산문화원, 예술의전당, 청소년수련원 등 공원조성계획 상 반영된 대부분 시설 조성을 완료하였으며, 저수지 주변 일부 구간이 미집행된 상태로, ▸향후 미집행구간 토지매입 완료시 공원조성계획 재검토하여 명품 수변공원이 될 수 있도록 추진할 계획임

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황(예산, 내용 등)

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

□ 제정 조례

연 번	조례명	제정일자	발의의원	추진현황	비 고
1	익산시 건축물 옥상녹화 등 지원 조례	2021.9.27.	김용균의원	옥상녹화 지원 수요조사 계획 중이며, 검토 후 사업추진 하겠음

8. 주요 사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

사 업 명	사업비 (천원)	사 업 량	진도(%)	비고
계	6,402,980	38건
익산국가산업단지 도시숲 조성사업	201,544	소나무 등 27종 9,017주 식재	100	21년 사고이월
부송동 탑천변 도시숲 조성사업	179,083	이팝나무 등 3종 11,667주 식재	100	당해
동산동 도시숲 조성사업	103,307	소나무 등 14종 4,325주 식재	100	당해
석암동 도시숲 조성사업	395,046	소나무 등 18종 10,390주 식재	100	당해
나룻가 도시숲 조성사업	365,973	소나무 등 9종 9,878주 식재	100	당해
동산동 수로변 도시숲 조성사업	34,977	황금사철 등 4종 5,200주 식재	100	당해
무궁화동산 조성사업	82,792	무궁화 등 4종 4,343주 식재, 우드칩 포설 135㎡ 등	100	당해
모현동2가 유휴부지 수목식재사업	32,724	소나무 등 6종 1,185주 식재	100	당해
평화동 유휴부지 수목식재사업	57,585	소나무 등 6종 954주 식재	100	당해
유천생태 시민의 숲 정비사업	47,604	잔디 5,000㎡ 식재	100	당해
국가식품클러스터 일원 미세먼지 차단숲 조성사업	728,610	소나무 등 22종 9,608주 식재	100	당해
호남고속국도 주변 미세먼지 차단숲 조성사업	678,304	계수나무 등 21종 16,569주 식재	100	당해
가을철 미세먼지 차단숲 조성사업	385,845	소나무 등 13종 12,484주 식재	100	당해
이리공고 학교숲 (구 명상숲) 조성사업	44,730	영산홍, 남천 등 5종 998주 식재	100	당해
춘포초등학교 학교숲(구 명상숲) 조성사업	47,733	이팝나무 등 9종 3,444주 식재	100	당해
이리서초등학교 학교숲(구 명상숲) 조성사업	48,153	소나무(장송) 등 6종 1,697주 식재	100	당해
원광중학교 학교숲 (구 명상숲) 조성사업	47,202	이팝나무 등 10종 1,832주 식재	100	당해
흥왕초등학교 학교숲(구 명상숲)조성사업	53,810	백목련 등 8종 881주 식재	100	당해
꽃 양묘장 관리 및 꽃조성사업	61,872	-만경강 제방 코스모스 꽃길조성 예정지 성토(5km) -솜리캠퍼스 꽃밭 부지 조성(5,000㎡) -꽃양묘장 암막 교체공사(1개소)	100	당해
꽃향기 가득한 품격 있는 익산만들기 사업	43,050	-꽃 조경시설 설치공사(익산시청 등 3개소) -구근류 식재(수선화 등 3종 2,480본)	100	당해
2021년 스마트가든 설치사업	79,867	실내식물 2,690본 식재	100	당해
2021년 스마트가든 설치사업(주얼팰리스)	34,432	실내식물 1,105본 식재	100	당해
2021년 가로수 조성사업	232,931	대간선수로 이팝나무 187주, 회양목 14,010주 식재	100	당해
2021년 명품 가로숲길 조성사업	339,484	서부역사 진입로 소나무 외 5종 56주, 꽃댕강 외 4종 5,970주 식재	100	당해
석방육교 관목 식재사업	85,893	영산홍 14,150주 식재	100	당해
영만초 자녀안심 그린숲 조성사업	66,807	황금사철 외 7종 5,084주 식재	100	당해
인화공원 무장애나눔길 조성사업	461,472	흙콘크리트 포장 5,520㎡, 황금사철 외 4종(7,470주) 식재, 잔디 3,596㎡, 식재 등	100	당해
인화공원 무장애나눔길 야간경관조명 조성사업	166,116	라인조명 36개, 볼라드조명 15개, 수목조명 16개 설치	100	당해
배산공원 산책로 정비사업	413,142	회양목 외 12종 식재(11,153주), 데크(176㎡), 침목계단(86개) 설치 등	100	당해
배산공원 맞이공간 정비사업	212,744	연결데크(1개소),경계석(90m), 측백나무 외 8종 식재(24,185주), 휴게시설 설치 등	100	당해
민간정원 보완사업	162,323	야자매트바닥정비(B=2m, L=474m),데크설치(B=1.8m, L=21m), 화장실(1개소) 및 등의자(15개) 설치	100	당해
2021년 상반기 공원 내 수목식재 사업	64,868	배산에코르공원 외 6개소 이팝나무 110주 식재	100	당해
물결공원 축구장 조명탑 설치 공사	66,055	축구장 조명탑 15M 2개소 및 조명등(LED 600W) 6개 설치	100	당해
목천2호공원 다목적구장 인조잔디 설치	49,854	인조잔디 설치 926㎡	100	당해
2021년 제3산업단지 녹지 예초사업	45,046	제3산업단지 녹지 예초 143,433㎡	100	당해
2021년 제3산업단지 녹지 예초사업(2차)	45,353	제3산업단지 녹지 예초 143,433㎡	100	당해
물결공원 축구장 조명탑 설치 공사(1회 추경)	54,676	축구장 조명탑 조명등(LED 600W) 18개 설치	100	당해
송정제공원 경관조명 설치공사	181,973	디자인울타리(330m) 및 LED핸드레일 조명(165개) 설치	100	당해

9. 2021년도 각종 민원 접수 및 처리 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

▣ 민원 접수처리 현황

(단위 : 건수)

합 계	진 정	질 의	요 청	탄 원	건 의
4	3	0	1	0	0

▣ 민원 접수처리 내역

종류	건명	민원인	요구내용	처리내용
진정	어양도시숲 족구장 폐쇄 또는 이전 요구	조영인 외 119명	▪민원인은 어양도시숲 내 족구장에서 족구하는 동호인들의 주·야간을 막론한 공튕김 소리와 환호성등의 소음으로, ▪늦은밤 수면을 방해하고 여름에도 맘 편하게 창문을 열수가 없음으로 족구장의 폐쇄 및 이전을 요청하오니 족구장 소음으로 인한 민원을 조속히 해결하여주시기 바람	▸어양도시숲 족구장은 시민들의 생활체육 활성화를 위해 소규모 생활체육시설의 순기능을 담당하고 있으며 현재는 족구장의 폐쇄나 이전에 대해서는 어려움이 있으며, ▸족구장을 이용하는 족구 동호인 등에게 안내하여 시설 이용시 소음 등으로 인한 민원이 발생하지 않도록 각별한 주의를 기울이도록 하겠음
진정	배산공원 토지보상	김정순	▪민원인은 배산공원 내 토지 소유자로, 토지규제에 따라 장기간 건축행위 및 토지의 활용이 제한되어 피해를 받았으므로 조속한 감정평가로 정당한 보상 요구	▸장기미집행 도시계획시설 실효제도 취지에 부합하게 토지 소유자의 재산권 침해를 최소화하기 위해 국·공유지보다 우선하여 사유지 매입을 추진하고 있으며, ▸효율적인 토지보상을 위해 장기미집행 공원별 보상 우선 순위를 정하여 연차별 보상 계획
진정	코로나-19 자가격리 기간 중 우천 시 유급휴가 인정 부분	박규석	▪공원(녹지) 수목관리 기간제 근로자로 코로나-19 자가격리 기간 중 우천 시 유급휴가 인정부분에 대하여 유권해석을 요청	▸｢감염병의 예방 및 관리에 관한 법률｣제41조의2에 의거 코로나-19 자가격리 기간 중에는 유급휴가를 제공하고 있으나, 코로나-19 격리 기간 중 우천시에는 「익산시 기간제 근로자 관리 규정」제65조 제5항 규정에 의하여 계약기간 중 보수는 실제 근로 일수, 시간에 대하여 지급함.
요청	목천삼거리 주변(익산역>만경교) 중앙분리대 화단으로 인한 역주행 사고위험	김시현	▪익산역 쪽 화단은 중앙선이지만, 만경교 쪽 화단은 중앙선이 아닌 일방향 분기(좌회전/직진)로 되어 있음. 익산역에서 화단을 따라 삼거리를 통과해 만경교로 진입할 경우, 만경교를 지나온 차량과 충돌사고가 발생할 수 있기 때문에 화단으로 인한 사고 발생 가능성이 높은 만큼 빠른 조치 요청	▸목천사거리 역주행 사고위험과 관련하여 교통행정과와 협의한 결과 역주행 사고위험을 줄이기 위해 차선유도선 도색공사를 완료하여 역주행이 발생하지 않도록 조치함.

10. 기금 운용 관련

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□

□ 위원회 설치 현황

위원회명	설치근거 (설치일자)	심의,의결,자문기능 여 부	위 원 수
			계	공무원	시의원	전문가	관련 단체	유관기관
익산시 도시숲등의 조성․관리 심의위원회 (위원장: 환경안전국장)	「익산시 도시숲 등의 조성 및 관리 조례」 제5조 (2008. 1. 11.)	자 문	8	1	-	6	1	-
익산시 도시공원 위원회 (위원장:부시장)	「익산시 도시공원 및 녹지등에 관한 조례」제18조 (2021. 9. 1.)	심 의	12	2	-	10	-	-

□ 위원회 예산 및 운영 현황

위원회명 (운영횟수)	구분	회의일자	회의록		수 당 지급액 (천원)	비고
			공개일자	공개방법
익산시 도시숲등의 조성ㆍ관리 심의위원회 (2회)	대면	’21.08.17.	’21.08.19.	시 홈페이지	420	․2021년 인화동 2가 도시숲 조성사업 수종 선정 및 사업 자문 ․행정지원과 예산 집행
	대면	’21.08.31.	’21.09.06.	시 홈페이지	490	․2021년 나룻가 도시숲 조성사업 수종선정 및 사업 자문 ․행정지원과 예산 집행
익산시 도시공원 위원회 ( 1회)	대면	’21.10.07.	’22.08.03.	시 홈페이지	900	․공원조성계획 결정 심의 ․행정지원과 예산 집행

□ 각종 위원회에서 심의하여 단체장의 의견이 수정된 사례

해    당    없    음

□ 단체장이나 부단체장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회 현황

위 원 회 명	위원장	비고
익산시 도시공원 위원회	부시장

□ 위원회 위원 명단

□ 익산시 도시숲등의 조성․관리 심의위원회

연번	성 명	소 속	직 위	비고
1	김성도	익산시	환경안전국장	당연직
2	김근섭	(사)푸른익산가꾸기운동본부	이사장	위촉
3	진영문	한국산림기술사협회 전북지부	지부장	위촉
4	권상진	한국산림기술사협회 전북지부	이사	위촉
5	박율진	전북대학교 환경생명자원대학	교수	위촉
6	안득수	전북대학교 농업생명과학대학	교수	위촉
7	전경수	원광대학교 농식품융합대학	교수	위촉
8	박윤점	원광대학교 농식품융합대학	교수	위촉

※ 위촉기간 : 2020. 2. 3. ~ 2022. 1. 31.(2년)

□ 익산시 도시공원 위원회

연번	성 명	소 속	직 위	비고
1	오택림	익산시	부시장	당연직
2	김성도	익산시	환경안전국장	당연직
3	이 다 예	국토연구원	교수	위촉
4	이 민 아	군산대학교	교수	위촉
5	김 상 욱	원광대학교 산림조경학과	교수	위촉
6	박 재 철	우석대학교 조경학과	교수	위촉
7	김 근 섭	(사)푸른익산가꾸기운동본부	이사장	위촉
8	진 영 문	한국산림기술사협회	지부장	위촉
9	심 윤 진	한국농수산대학교 조경학과	교수	위촉
10	김 정 문	전북대학교 조경학과	교수	위촉
11	권 상 진	한국산림기술사협회 전북지부	이사	위촉
12	조 장 환	원광대학교 산림조경학과	교수	위촉

※ 위촉기간 : 2021. 9. 1. ~ 2023. 8. 31.(2년)

12. 용역사업 관련

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 용역사업(용역명, 용역업체, 용역비, 계약방법)

구분	사 업 명	사업비 (천원)	업체명	기간	사 업 내 용	계약 방법
계	44건	507,080
설계용역	2021년 무궁화동산 조성 실시설계 용역	4,798	(유)아라기술공사	21.1.11. ~21.2.19.	무궁화동산 조성 실시설계	수의 계약
설계용역	2021년 자녀안심 그린숲 조성사업 실시설계 용역	4,798	(유)탑 엔지니어링	21.1.13. ~21.2.11.	궁동초, 영만초 자녀안심 그린숲 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	2021년 스마트가든 설치사업 실시설계용역	5,700	㈜태원 엔지니어링	21.1.13. ~21.2.21.	스마트가든 설치사업 4개소 실시설계	수의 계약
설계용역	도시숲 및 교통섬 수목전지, 지주끈 정비사업 실시설계 용역	1,858	㈜태원 엔지니어링	21.1.13. ~21.2.1.	도시숲 및 교통섬 8개소 수목전지, 지주끈 정비 실시설계	수의 계약
설계용역	2021년 가로수 조성사업 실시설계 용역	17,810	(유)홍운 엔지니어링	21.1.22. ~21.2.20.	대간선수로 가로수 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	유휴부지 수목식재 사업 실시설계용역	24,384	(유)상원 엔지니어링	21.1.25. ~21.3.5.	유휴부지 수목식재 5개소 실시설계	공개경쟁
설계용역	학교숲 조성사업 실시설계용역	13,358	(유)탑엔지니어링	21.1.25. ~21.2.18.	학교숲 조성 5개소 실시설계	수의계약
설계용역	인화공원 무장애나눔길 조성사업 실시설계용역	19,205	㈜우향이앤씨	21.1.25. ~21.3.30.	인화공원 무장애나눔길 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	배산공원 맞이공간 정비사업 기본 및 실시설계 용역	19,175	㈜태원 엔지니어링	21.1.26. ~21.3.26.	배산공원 맞이공간 정비사업 기본 및 실시설계	수의 계약
설계용역	도시숲 조성사업 실시설계용역	41,023	(유)상원 엔지니어링	21.1.27. ~21.3.7.	도시숲 조성 3개소 실시설계	공개경쟁
설계용역	2021년 명품가로숲길 조성사업 실시설계 용역	17,713	한솔산림기술사 사무소	21.1.29. ~21.3.9.	서부역사 진입로 명품 가로숲길 조성사업 실시설계	수의 계약
감리용역	미세먼지 차단숲 조성사업 감리용역	16,889	산림조합중앙회 전북지역본부	21.2.15. ~21.7.14.	미세먼지 차단숲 조성 감리	수의계약
설계 용역	물결공원 축구장 조명탑 설치공사 실시설계 용역	4,462	(유)광진이엔지	21.2.18. ~21.3.19.	축구장 조명탑 및 분전함(제어반) 등의 설치공사 실시설계 1식	수의 계약
감리용역	학교숲 조성사업 감리용역	6,021	한솔산림기술사사무소	21.2.23. ~21.8.3.	학교숲 조성 5개소 감리	수의계약
감리용역	2021년 가로수 조성사업 감리용역	4,030	(유)제이비 기술공사	21.2.26. ~21.5.20.	대간선수로 가로수 조성사업 감리	수의 계약
감리용역	2021년 무궁화동산 조성 감리용역	2,780	(유)제이비 기술공사	21.3.2. ~21.7.29.	무궁화동산 조성 감리	수의 계약
감리용역	도시숲 조성사업 감리용역	12,815	(유)아라기술공사	21.3.2. ~21.7.29.	도시숲 조성 3개소 감리	수의계약
설계용역	꽃양묘장관리 및 꽃조성사업 실시설계용역	1,731	㈜우향이앤씨	21.3.5. ~21.4.8.	전북대(익산캠퍼스) 기반조성 및 꽃양묘장 암막교체공사 실시설계	수의 계약
설계용역	꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기사업 실시설계용역	1,950	㈜우향이앤씨	21.3.5. ~21.4.8.	꽃 조경시설 3개소 설치 실시설계	수의 계약
설계용역	민간정원 정비사업 기본 및 실시설계 용역	19,604	㈜주한건설 기술단	21.3.10. ~21.4.18.	민간정원 정비사업 기본 및 실시설계	수의계약
폐기물 용역	2021년 상반기 임목폐기물 처리용역	15,570	(유)해머	21.3.26. ~21.4.14.	임목폐기물 200ton 처리	수의 계약
일반 용역	익산시 상반기 어린이 놀이시설 모래소독 용역	12,603	성원환경산업	21.3.31. ~21.6.27.	장미공원 등 24개소 모래소독 : 5,475㎡ 모래보충 : 43㎥	수의 계약
감리용역	인화공원 무장애나눔길 조성사업 감리용역	8,500	한솔산림기술사사무소	21.4.6. ~21.7.19.	인화공원 무장애나눔길 조성사업 감리	수의 계약
감리용역	2021년 명품가로숲길 조성사업 감리 용역	6,130	(유)제이비 기술공사	21.4.7. ~21.7.15.	서부역사 진입로 명품 가로숲길 조성사업 감리	수의 계약
감리용역	유휴부지 수목식재 사업 감리용역	3,929	(유)다숲 엔지니어링	21.4.21. ~21.7.29.	유휴부지 수목식재 5개소 감리	수의계약
설계용역	배산공원 산책로 정비사업 실시설계 용역	19,762	(유)장흥건설 기술공사	21.4.22. ~21.6.10.	배산공원 산책로 정비사업 실시설계	수의계약
폐기물 용역	2021년 임목폐기물 처리용역	8,488	(유)해머	21.6.23. ~21.7.12.	임목폐기물 104ton 처리	수의 계약
설계용역	나룻가 도시숲 조성사업 실시설계용역	19,520	(유)다숲 엔지니어링	21.7.26. ~21.9.3.	나룻가 도시숲 조성 실시설계	수의계약
일반용역	도시숲 및 교통섬 병충해방제 용역	9,850	㈜전북나무 종합병원	21.7.26. ~21.8.22.	도시숲 및 교통섬 9개소 병충해 방제	수의 계약
설계용역	가을철 미세먼지 차단숲 조성사업 실시설계 용역	17,784	(유)상원 엔지니어링	21.7.27. ~21.9.4.	미세먼지 차단숲 조성 실시설계	수의계약
설계용역	인화공원 무장애나눔길 야간경관 조성사업 기본 및 실시설계 용역	15,786	㈜유엘피	21.8.11. ~21.10.8.	인화공원 무장애나눔길 야간경관 조성사업 기본 및 실시설계	수의 계약
설계용역	배산공원 둘레길 정비사업 실시설계 용역	18,905	㈜태원 엔지니어링	21.8.17. ~21.10.5.	배산공원 둘레길 정비사업 실시설계	수의계약
설계용역	배산공원 야간경관조명 정비사업 실시설계 용역	19,266	㈜유엘피	21.9.6. ~21.11.4.	배산공원 야간경관조명 정비사업 실시설계	수의계약
설계 용역	송정제공원 경관조명 설치공사 디자인개발 및 기본·실시 설계용역	14,709	㈜씨앤시라이트웨이	21.9.13. ~21.11.15.	디자인울타리(330m) 및 LED핸드레일 조명(165개) 등 설치 실시설계 1식	수의 계약
감리용역	가을철 미세먼지 차단숲 조성사업 감리 용역	6,766	한솔산림기술사사무소	21.9.15. ~21.12.23.	미세먼지 차단숲 조성 감리	수의계약
감리용역	나룻가 도시숲 조성사업 감리용역	6,935	(유)다숲 엔지니어링	21.9.23. ~21.12.31.	나룻가 도시숲 조성 감리	수의계약
일반 용역	2021년 공원 전기설비 안전진단 용역	6,260	한국전기 안전공사	21.9.27. ~21.10.25.	약촌공원 외 85개소 분전함 및 공원등주 50개 안전진단 1식	수의 계약
일반 용역	익산시 하반기 어린이 놀이시설 모래소독 용역	10,351	(유) 현대그린환경	21.10.1. ~21.11.18.	장미공원 등 24개소 모래소독 : 5,475㎡	수의 계약
감리용역	인화공원 무장애나눔길 야간경관 조성사업 전기감리용역	10,600	㈜건이엔지	21.11.3. ~21.12.21.	인화공원 무장애나눔길 야간경관 조성사업 전기감리	수의 계약
폐기물 용역	배산공원 산책로 정비사업 폐기물 처리용역	510	(유)진영환경	21.11.3. ~22.4.5.	배산공원 산책로 정비사업 폐기물 처리용역	수의계약
설계 용역	2022년 자녀안심 그린숲 실시설계 용역	7,630	(유)다숲 엔지니어링	21.11.8. ~21.12.7.	백제초~마한초 자녀안심 그린숲 조성사업 실시설계	수의 계약
설계용역	2022년 명품가로숲길 조성사업 실시설계 용역	11,072	(주)우향이앤씨	21.11.25. ~21.12.19.	익산종합운동장 진입로 명품가로숲길 조성사업 실시설계	수의 계약
감리 용역	송정제공원 경관조명 설치공사 전기감리 용역	3,250	㈜건이엔지	21.11.30. ~21.12.21.	송정제공원 경관조명 설치공사 전기감리 1식	수의 계약
폐기물 용역	2021년 하반기 임목폐기물 처리용역	12,800	(유)해머	21.12.6. ~21.12.20.	임목폐기물 160ton 처리	수의 계약

□ 용역비 미집행 사업 추진 현황

해    당    없    음

□ 용역사업 중 사전 기술심사를 하여 참가자격 제한 사례

해    당    없    음

□ 각종 용역사업 중 실제사업에 적용시키지 못하고 사장하고 있는 용역현황

해    당    없    음

□ 각종 용역 사업 중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례

해    당    없    음

13. 인․허가 민원처리 관련 사항

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

(단위:천원)

일자	사업명	당초	변경	계약자	증△감	공 사 기 간	변 경 사 유
4.13.	무궁화동산 조성사업	83,611	82,792	㈜두성조경	△819	21.3.31. ~21.4.27.	·현장여건을 반영하여 마운딩 물량 감소 및 중기운반 제거
4.29.	부송동 탑천변 도시숲 조성사업	166,235	179,083	익산 산림조합	12,848	21.4.5. ~21.5.2	·현장여건을 반영하여 관목 및 지피식물 추가 식재 등
5.7.	2021년 가로수 조성사업	235,180	232,931	익산 산림조합	△2,249	21.3.23. ~21.5.11.	·현장여건을 반영하여 객토운반량 감소, 보험료 미집행으로 감액
5.10.	모현동2가 유휴부지 수목식재사업	31,233	32,724	㈜내담 건설	1,491	21.4.12. ~21.5.9.	·현장여건을 반영하여 관목 식재 증가, 폐기물처리비 반영 등
5.14.	평화동 유휴부지 수목식재사업	55,291	57,585	(주)조경미술연구소	2,294	21.4.21. ~21.5.18.	·현장여건을 반영하여 블록쌓기 면적 증가, 폐기물처리비 정산 등
5.17.	흥왕초등학교 학교숲(구 명상숲)조성사업	51,354	53,810	(유)상선	2,456	21.4.6. ~21.5.25.	·현장 여건 반영하여 조성면적 감소
5.17.	영만초 자녀안심 그린숲 조성사업	61,402	66,807	주식회사 두성조경	5,405	21.3.31. ~21.5.19.	·현장여건을 반영하여 식재수량 증가, 규격 변경
5.18.	배산공원 맞이공간 정비사업	182,422	212,744	익산 산림조합	30,322	21.4.5. ~21.5.24.	·현장여건을 반영하여 토공 및 식재증가
5.21.	2021년 명품 가로숲길 조성사업	316,685	339,484	익산 산림조합	22,799	21.4.5. ~21.5.24.	·현장여건을 반영하여 식재수량 증가
5.21.	석암동 도시숲 조성사업	393,577	395,046	익산 산림조합	1,469	21.4.13. ~21.5.22.	·현장여건을 반영하여 교목 추가식재 및 보험료 등 준공정산
6.8.	국가식품클러스터 일원 미세먼지 차단숲 조성사업	718,811	728,610	익산 산림조합	9,799	21.3.23. ~21.6.30.	·현장여건을 반영하여 교목 추가식재 등 ·보험료 등 준공정산
6.8.	호남고속국도 주변 미세먼지 차단숲 조성사업	693,535	678,304	익산 산림조합	△15,231	21.3.23. ~21.6.30.	·현장여건을 반영하여 수종 변경 및 교목 추가식재 등 ·보험료 등 준공정산
6.25.	인화공원 무장애나눔길 조성사업	433,203	461,472	익산 산림조합	28,269	21.4.5. ~21.7.3.	·현장여건을 반영하여 포장공 및 식재 증가
7.6.	민간정원 보완사업	165,261	162,323	(유)영민조경	△2,938	21.5.25 ~21.7.23.	·현장여건을 반영하여 배수시설 및 조경석 추가 ·각종 보험료 준공정산
9.9.	2021년 스마트가든 설치사업(주얼팰리스)	32,546	34,432	익산 꽃집	1,886	21.8.17. ~21.9.10.	·현장여건에 따른 실내식물 수량 증가 등
11.2.	오산면오산마실도시숲 산책로 정비사업	18,738	23,496	㈜유스켐	4,758	21.10.21. ~21.11.17.	·현장여건을 반영하여 노면청소 및 탄성포장 물량 증가
11.8.	유천생태 시민의 숲 정비사업	44,176	47,604	(유)한일 조경개발	3,428	21.10.20. ~21.11.16.	·현장여건을 반영하여 식재면고르기 추가
11.25.	꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기	5,434	5,729	(유)더원건설	295	21.11.9. ~21.12.8.	·현장여건에 따른 수선화 외 1종 물량 증가
12.6.	가을철 미세먼지 차단숲 조성사업	362,370	385,845	익산 산림조합	23,475	21.10.14. ~21.12.12.	·현장여건을 반영하여 수종 변경 및 추가식재 등 ·보험료 등 준공정산
12.7.	인화공원 무장애나눔길 야간경관조명 조성사업	142,362	166,116	(유)삼강전력공사	23,754	21.11.3. ~21.12.17.	·현장여건을 반영하여 경관조명 증가 ·각종 보험료 준공정산
12.13.	나룻가 도시숲 조성사업	355,942	365,973	익산 산림조합	10,031	21.10.14. ~21.12.12.	·현장여건을 반영하여 유휴공간 추가식재 및 보험료 등 준공정산
12.13.	송정제공원 경관조명 설치공사	170,242	181,973	㈜에스엠전기	11,731	21.11.30. ~21.12.19.	·현장 여건에 따른 자재 수량 증가

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

(단위:천원)

사 업 명	사 업 개 요	사업기간	사업비	진도 (%)
계	38건		6,402,980
익산국가산업단지 도시숲 조성사업	소나무 등 27종 9,017주 식재	20.10.20. ~21.11.30.	201,544	100
2021년 상반기 공원 내 수목식재 사업	배산에코르공원 외 6개소 이팝나무 110주 식재	21.3.12. ~21.5.10.	64,868	100
국가식품클러스터 일원 미세먼지 차단숲 조성사업	소나무 등 22종 9,608주 식재	21.3.23. ~21.6.30.	728,610	100
호남고속국도 주변 미세먼지 차단숲 조성사업	계수나무 등 21종 16,569주 식재	21.3.23. ~21.6.30.	678,304	100
2021년 가로수 조성사업	대간선수로 이팝나무 187주, 회양목 14,010주 식재	21.3.23. ~21.5.11.	232,931	100
무궁화동산 조성사업	무궁화 등 관목 4종 4,343주 식재, 우드칩 포설 135㎡ 등	21.3.31. ~21.4.27.	82,792	100
영만초 자녀안심 그린숲 조성사업	황금사철 외 7종 5,084주 식재	21.3.31. ~21.5.19.	66,807	100
이리공고 학교숲 (구 명상숲) 조성사업	영산홍, 남천 등 5종 998주 식재	21.4.2. ~21.5.21.	44,730	100
춘포초등학교 학교숲(구 명상숲) 조성사업	이팝나무 등 9종 3,444주 식재	21.4.2. ~21.5.21.	47,733	100
부송동 탑천변 도시숲 조성사업	이팝나무 등 3종 11,667주 식재	21.4.5. ~21.5.2.	179,083	100
이리서초등학교 학교숲(구 명상숲) 조성사업	소나무(장송) 등 6종 1,697주 식재	21.4.5. ~21.5.24.	48,153	100
2021년 명품 가로숲길 조성사업	서부역사 진입로 소나무 외 5종 56주, 꽃댕강 외 4종 5,970주 식재	21.4.5. ~21.5.24.	339,484	100
배산공원 맞이공간 정비사업	연결데크(1개소), 경계석(90m), 측백나무 외 8종 식재(24,185주), 휴게시설 설치 등	21.4.5. ~21.5.24.	212,744	100
인화공원 무장애나눔길 조성사업	흙콘크리트 포장 5,520㎡, 황금사철 외 4종(7,470주) 식재, 잔디 3,596㎡, 식재 등	21.4.5. ~21.7.3.	461,472	100
원광중학교 학교숲 (구 명상숲) 조성사업	이팝나무 등 10종 1,832주 식재	21.4.6. ~21.5.25.	47,202	100
흥왕초등학교 학교숲(구 명상숲)조성사업	백목련 등 8종 881주 식재	21.4.6. ~21.5.25.	53,810	100
동산동 도시숲 조성사업	소나무 등 14종 4,325주 식재	21.4.9. ~21.5.6.	103,307	100
모현동2가 유휴부지 수목식재사업	소나무 등 6종 1,185주 식재	21.4.12. ~21.5.9.	32,724	100
석방육교 관목 식재사업	영산홍 14,150주 식재	21.4.13. ~21.5.2.	85,893	100
석암동 도시숲 조성사업	소나무 등 18종 10,390주 식재	21.4.13. ~21.5.22.	395,046	100
평화동 유휴부지 수목식재사업	소나무 등 6종 954주 식재	21.4.21. ~21.5.18.	57,585	100
물결공원 축구장 조명탑 설치공사	축구장 조명탑 15M 2개소 및 조명등(LED 600W) 6개 설치	21.4.23. ~21.5.12. (본예산)	66,055	100
목천2호공원 다목적구장 인조잔디 설치	인조잔디 설치 926㎡	21.4.23. ~21.6.3.	49,854	100
꽃양묘장 관리 및 꽃조성사업	-만경강 제방 코스모스 꽃길조성 예정지 성토(5km) -솜리캠퍼스 꽃밭 부지 조성(5,000㎡) -꽃양묘장 암막 교체공사(1개소)	21.4.27. ~21.6.19.	61,872	100
꽃향기 가득한 품격 있는 익산만들기 사업	-꽃 조경시설 설치공사(익산시청 등 3개소) -구근류 식재(수선화 등 3종 2,480본)	21.5.3. ~21.12.8.	43,050	100
2021년 스마트가든 설치사업	실내식물 2,690본 식재	21.5.24. ~21.6.17.	79,867	100
민간정원 보완사업	야자매트바닥정비(B=2m, L=474m),데크설치(B=1.8m, L=21m), 화장실(1개소) 및 등의자(15개) 설치	21.5.25. ~21.7.23.	162,323	100
2021년 제3산업단지 녹지 예초사업	제3산업단지 녹지 예초 143,433㎡	21.7.1. ~21.8.30.	45,046	100
2021년 스마트 가든 설치사업(주얼팰리스)	실내식물 1,105본 식재	21.8.17. ~21.9.10.	34,432	100
배산공원 산책로 정비사업	회양목 외 12종 식재(11,153주), 데크(176㎡), 침목계단(86개) 설치 등	21.9.28. ~22.4.20.	413,142	100
2021년 제3산업단지 녹지 예초사업(2차)	제3산업단지 녹지 예초 143,433㎡	21.10.8. ~21.12.6.	45,353	100
나룻가 도시숲 조성사업	소나무 등 9종 9,878주 식재	21.10.14. ~21.12.12.	365,973	100
가을철 미세먼지 차단숲 조성사업	소나무 등 13종 12,484주 식재	21.10.14. ~21.12.12.	385,845	100
유천생태 시민의 숲 정비사업	잔디 5,000㎡ 식재	21.10.20. ~21.11.16.	47,604	100
인화공원 무장애나눔길 야간경관조명 조성사업	라인조명 36개, 볼라드조명 15개, 수목조명 16개 설치	21.11.3. ~21.12.17.	166,116	100
동산동 수로변 도시숲 조성사업	황금사철 등 4종 5,200주 식재	21.11.12. ~21.12.1.	34,977	100
물결공원 축구장 조명등 설치공사	축구장 조명탑 조명등(LED 600W) 18개 설치	21.11.24. ~21.12.13. (1회 추경)	54,676	100
송정제공원 경관조명 설치공사	디자인울타리(330m) 및 LED핸드레일 조명(165개) 설치	21.11.30. ~21.12.19.	181,973	100

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

(단위:천원)

보조사업자명	지원액	집행액	집행내역	지원근거	비고
(사)푸른익산 가꾸기운동본부	121,000	121,000	(사)푸른익산가꾸기 운동본부 인건비 및 사업비	푸른익산 만들기 운동 육성 및 지원 조례

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액				집행액	비율 (%)
	계	국비	도비	시비
계	5,370,667	1,102,000	1,750,000	2,518,667	5,370,667	100
미세먼지 차단숲 조성사업	1,884,000	942,000	0	942,000	1,884,000	100
도시숲조성사업 (도시숲조성)(전환사업)	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100
도시숲조성사업 (명상숲조성)(전환사업)	300,000	0	150,000	150,000	300,000	100
도시숲조성사업 (가로수조성)(전환사업)	800,000	0	400,000	400,000	800,000	100
녹색자금 지원사업	666,667	0	400,000	266,667	666,667	100
무궁화동산조성	100,000	50,000	0	50,000	100,000	100
2021년 스마트가든 설치사업	120,000	60,000	0	60,000	120,000	100
자녀안심그린숲	100,000	50,000	0	50,000	100,000	100
송정제공원 경관조명 설치공사	200,000	0	200,000	0	200,000	100

18. 지방보조금 성과평가내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

□ 2021년(2020년 지방보조사업) 지방보조사업 3년 미만 사업 평가결과

해    당    없    음

□ 2021년(2020년 지방보조사업) 지방보조사업 3년 이상 계속사업 평가결과

◦ 매우우수(S): 1건

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	총사업비	사업내용	평가결과	평가결과 반영내역
	1개 사업
1	2020년도 푸른익산 가꾸기 사업	110,000	∙푸른익산만들기 (500만 그루 나무심기 사업) 민간부문 추진	매우우수(S)	계속지원
				96점

19. 2021년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

(단위:천원)

사 업 명	이 월 액	집 행 액	잔 액	비고
계	214,286	214,286	0
익산국가산업단지 도시숲 조성사업	201,544	201,544	0	사고
도시숲 조성사업 감리용역	12,742	12,742	0	사고

20. 2022년도 명시이월 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	공원조성계장		정웅	□

(단위 : 천원)

사 업 명	이 월 액	집 행 액	잔 액	비고
1건
배산공원 조성사업	1,310,033	1,151,861	158,172

21. 2022년도 명시이월(의회제출) 후 2021년도에 집행한 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

22. 예산이용, 전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

24. 국․도비예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		정원문화산업계장		이승훈	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정웅	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 2021년도 반납건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	81,957	140,330	199	2,640
2020년 생활권 수목진료 지원	3,125	937	157	47	낙찰차액
2020년 산림 서비스도우미	20,832	6,249	4	1	인건비 잔액
2020년 미세먼지 차단숲 조성사업	58,000	0	38	0	폐기물 처리비 정산
2020년 녹색일자리 확충	0	4,944	0	1	인건비 잔액
지역밀착형참여사업 (공원관리)	0	43,400	0	963	집행잔액
공원정비 (주민참여예산)	0	84,800	0	1,628	집행잔액

□ 2022년도 반납예정건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 예 정 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
2021년 주민참여예산 (배산부영공원 산책로 잔디등 및 해충포집기 설치)	0	16,800	0	358	집행잔액

26. 2021년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

27. 2021년도 계획사업 중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

28. 2021년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

29. 2021년도 예산 편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

31. 소송 사건 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

32. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□
		가로수환경계장		이미란	□
		공원조성계장		정 웅	□
		공원관리계장		김진형	□

구 분	접 수 건 수	처 리 건 수	비 고
계	51	51
도시숲 유지관리	1	1
가로수 유지관리	9	9
공원계획 및 조성 관련	8	8
공원녹지 시설 유지관리	28	28
공원녹지 수목 유지관리	5	5

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

36. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

해 당 없 음

과 요구사항

1. 가로수 조성 및 유지관리

확인자	:	늘푸른공원과장		강 금 진	□
작성자	:	가로수환경계장		이미란	□

□ 사 업 개 요

◦ 위     치

▸ 가로수 및 명품가로숲길 조성 : 금강동 대간선수로 2km, 서부역사 진입로 2㎞

▸ 자녀안심 그린숲 조성     : 오산면 영만초, 부송동 궁동초

▸ 가로수 유지관리             : 하나로 등 136개 노선 342㎞

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,316백만원(국비 50, 도비 400, 시비 866)

◦ 사업내용 : 가로수·명품 가로숲길 및 자녀안심 그린숲 조성, 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 가로수 및 명품가로숲길 조성사업

▸ 금강동 대간선수로 2㎞                  : 이팝 187주, 회양목 14,010주 식재

▸ 서부역사 진입로 2㎞          : 소나무 외 5종 56주, 꽃댕강 외 4종 7,895주 식재

- 봄철 : 소나무외 5종 56주, 꽃댕강외 4종 5,970주 식재  - 가을철 : 꽃댕강 1,925주 식재

◦ 자녀안심 그린숲 조성사업

▸ 영만초(황금사철 외 6종 5,084주)    ▸ 궁동초(영산홍 1,780주)

◦ 가로수 보식사업

▸ 1공단 왕벚나무 보식사업 외 3개사업      : 왕벚 등 4종 98주 식재

◦ 가로수 전지사업

▸ 금마면 메타세콰이아 가로수 전지사업 외 6개사업 : 524주

◦ 가로수 유지관리(인건비 및 재료비 등)

▸ 가로수 가지치기, 은행 열매 조기 채취, 수벽전정, 예취 및 풀매기 등

□ 향 후 계 획

◦ 지속적인 가로수 관리를 통한 안전하고 아름다운 도시경관 창출

2. 꽃향기 가득한 익산만들기사업 추진현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	정원문화산업계장		이승훈	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산대로 등 주요도로변, 교통섬 등

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 601백만원(인건비 465, 재료비 54, 시설비 45, 운영비 등 37)

◦ 사업내용

▸ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진

▸ 특화거리 및 꽃길조성, 각종 축제지원, 계절별 꽃 생산 및 식재

□ 추 진 실 적

◦ 계절별 꽃 생산 및 식재	: 2021.3.~12.

▸ 내    용 : 튤립, 팬지 등 10종 100만 본 양묘 및 식재

◦ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진(3회: 3월, 7월, 9월)

▸ 내    용 : 계절별 3회 기관 및 학교(총 701개소) 초화류 21만 본 지원

◦ 자연친화 감성 꽃거리 및 꽃밭조성	: 2021.3.~11.

▸ 시 경계 진입로 등 5개소 30㎞, 교통섬 11개소, 걸이화분 1,085개 꽃식재

▸ 전북대학교 특성화 캠퍼스 내 5,000㎡ 꽃밭조성 / 메리골드 등 6종 6만본

▸ 꽃 조경시설 설치 및 구근류 식재 공사(익산역 앞 등 4개소)

▸ 만경강 제방, 삼기산 사거리~미륵사지 등 4개소 코스모스 꽃길 조성 (15km)

◦ 2022년 봄꽃(30만본) 육묘	: 2021.11.~12.

□ 향 후 계 획

◦ 지속적인 꽃 생산 및 꽃길조성 사업 추진

3. 500만 그루 나무심기 사업 추진현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	푸른숲조성계장		김정현	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 가로변, 공원, 완충녹지, 유휴토지, 학교 등 도심 전역

◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2023.(5개년)

◦ 사 업 비 : 36,321백만원(국비 5,807, 도비 6,586 시비 23,928)

◦ 사업규모 : 505만 그루(공공 481만, 민간 24만)

◦ 내    용 : 도시숲 등 수목 식재, 시민과 함께하는 나무심기 등

◦ 연도별 식재 계획                                               (단위:주)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	계
계	418,114	508,040	600,386	1,414,352	2,110,789	5,051,681
공공부문	358,659	454,560	559,708	1,350,305	2,092,424	4,815,656
민간부문	59,455	53,480	40,678	64,047	18,365	236,025

▸ ’19~’21년 식재 실적 : 1,689,329주 (공공 1,416,119, 민간 273,210)

□ 추 진 실 적

◦ 2021년 수목식재 추진(537,007주)	: 2021. 2.~12.

▸ 공공부문 사업추진(도시숲 및 가로수, 학교숲 조성 등) - 409,511주

▸ 민간부문 사업추진(주택건설사업, 아가숲 조성 등) - 127,496주

◦ 2021년 나무 나누어주기 추진(35,033주)

▸ 공동체 - 자산홍 등 5종 28,033주	: 2021. 3.26.

▸ 시민참여 - 사과나무 등 5종 7,000주	: 2021. 3.18.~19.

◦ 익산시민 탄생기념 아가숲 조성(610주)	: 2021. 4.~6.

▸ 홍가시, 팥배나무 등 610주

□ 향 후 계 획

◦ 500만 그루 나무심기 사업 지속 추진	: 2022.~2023.

◦ 500만 그루 나무심기 수목 등 유지관리	: 계속

4. 배산공원 조성사업 추진 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	공원조성계장		정 웅	□

□  사 업 개 요

◦ 위    치 : 모현동2가 산9-1번지 일원 배산근린공원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 2,000백만원(‘22년 400백만원, ‘21년 1,600백만원)

◦ 사업내용

▸(1단계) 맞이공간 꽃길・화단 조성, 운동시설 정비

▸(2단계) 산책로 및 둘레길, 휴게・편익시설 정비 및 야간경관조명 설치

▸(3단계) 공원조성계획 재정비에 따른 잔여부지 사업추진(`22.~`23.)

□ 추 진 실 적

◦ 1단계 배산공원 맞이공간 정비사업 시행	: 2021. 3. ~  5.

▸ 운동시설 재포장, 진입로 평탄화, 노후 울타리 철거 및 메시 휀스 설치 등

◦ 2단계 산책로 정비사업 시행	: 2021. 4. ~  11.

▸ 노후 울타리 철거, 침목계단 및 돌계단 재설치, 편백나무숲 데크계단 및 전망대 데크 설치, 산책로 휴식공간 조성 등

◦ 2단계 둘레길 및 야간경관 정비사업 추진	: 2021. 8. ~ 2022. 6.

▸ 둘 레 길 : 하산길 위험구간 데크계단 설치, 연주정·배산정 도색 및 보수

▸ 야간경관 : 입구부 500m 구간 노후보안등 철거 및 산책로 안전조명 개선 등

□ 향 후 계 획

◦ 2단계 공원등 정비사업 추진(‘22년 예산액)	: 2022. 7. ~ 11.

▸야간보행을 위한 내부 둘레길 공원등 정비(2km)

5. 인화공원 조성사업 추진 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	공원조성계장		정 웅	□

□ 사 업 개 요

◦ 명    칭 : 인화근린공원(전라북도 고시 제2017-165호(2017.8.18.))

◦ 위    치 : 구)동익산역 ~ 춘포역(공원결정면적 A=137,816㎡, L=4.8㎞)

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2022.

◦ 사 업 비 : 5,617백만원(국비 1,628, 도비 690, 시비 2,999, 기금 300)

◦ 내    용 : 인화공원 단계별 조성(A=50,771㎡)

▸ 1단계 - 남부권 나눔숲(A=6,000㎡)                    : 2016. ~ 2017.

▸ 2단계 - 다기능 힐링공원(A=10,000㎡), 명품 가로숲길(A=3,800㎡)

공공시설 여성화장실 확충(A=69㎡)            : 2018. ~ 2019.

▸ 3단계 - 대규모 도시숲 1차(A=11,300㎡)                  : 2018. ~ 2019.

▸ 4단계 - 대규모 도시숲 2차(A=15,000㎡)                 : 2019. ~ 2020.

▸ 5단계 - 솜리메타누리길 무장애나눔길(A=4,671㎡)

무장애나눔길 야간경관조명(200m)	: 2021.

▸ 6단계 - 솜리메타누리길 야간경관조명(L=1.1㎞)

대규모 도시숲 조성사업3차(A=5,917㎡)	: 2022.

□ 추 진 실 적

◦ 무장애나눔길 조성사업(L=1.3㎞, B=6m)	: 2021. 1.~ 7.

◦ 무장애나눔길 야간경관조명(200m)	: 2021. 8.~ 12.

□ 향 후 계 획

◦ 인화공원 공공시설(화장실) 설치사업 추진	: 2022. ~ 2023.

◦ 솜리메타누리길 조성사업(L=2.9㎞, B=6m) 추진	: 2023. ~ 2024.

6. 도시공원 및 녹지관리 추진 현황

확인자	:	늘푸른공원과장		강금진	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□

□ 관 리 현 황

◦ 대    상 : 148개소 355ha(공원 80개소 314ha, 녹지 68개소 41ha)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 2,084백만원(시설관리 1,252, 수목관리 832)

◦ 사업내용 : 공원시설물 설치 및 유지보수, 수목 식재 및 관리

□ 추 진 실 적

◦ 공원(녹지) 시설물 설치 및 노후□파손 시설 유지보수

▸ 운동기구(15개), 의자(21개), 퍼걸러(3조), 음수대(7개소), 잔디등 및 해충포집기(24개)

▸ 운동기구, 의자, 산책로, 화장실, 퍼걸러, 전기, 공원등, 기타시설: 배산근린공원 외 76개소

▸ 배산휴먼공원 발물놀이터 분전함 지상 이전 및 송정제공원 제어반 교체

▸ 송정제공원 경관조명 설치: 디자인울타리 330m 및 LED핸드레일 조명 165개

◦ 공원시설물 안전점검

▸ 어린이놀이터 안전관리 : 안전점검 40개소(12회), 정기검사(24개소, ‘21.2.)

▸ 어린이 놀이터 모래소독(기생충란, 중금속) 24개소(모래소독 5,475㎡ 2회, 모래보충 43㎥)

▸ 공원 내 공중화장실 불법 촬영 카메라 점검 : 부송공원 외 51개소(자체점검 12회)

▸ 공원 전기시설 안전진단(한국전기안전공사) : 약촌공원 외 85개소

◦ 체육시설 개선사업

▸ 조명탑 설치 : 물결공원 축구장{조명탑(15m) 2개소, 조명등(600W) 24개}

▸ 인조잔디 설치 : 목천2호공원 다목적구장(926㎡)

◦ 공원(녹지) 수목 식재 및 유지관리

▸ 수목 및 초화류 식재 : 영산홍 외 9종 6,730주(배산에코르공원 외 10개소)

▸ 수목전지작업 : 소나무 135주(다송근린공원 외 2개소)

▸ 수목병해충방제, 가지치기, 지주목 정비, 예초 및 제초 : 수시 시행

◦ 공원(녹지) 환경 및 시설정비

▸ 기간제근로자(9명) 사역하여 화장실(52개소) 등 공원 환경정비 및 시설 정비

□ 향 후 계 획

◦ 안전하고 쾌적한 관리로 공원환경 개선