2022.  9.

제246회 익산시의회(1차 정례회)

2022 행정사무감사자료

	상하수도사업단

하 수 도 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2021년도 업무성과 및 반성	61
				2.	2021년도 예산집행 및 추진사항	62
				3.	2021년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	63
				4.	2021년도 감사시 지적사항 및 조치 결과	66
				5.	5분 자유발언 조치 결과	67
				6.	시정질문에 대한 조치 결과	68
				7.	의원발의 조례 제·개정 후 추진현황	68
				8.	주요사업 조서(3천만원 이상)	69
				9.	2021년 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역	73
				10.	기금 운용 관련	74
				11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	74
				12.	용역사업 관련	75
				13.	인․허가 민원처리 관련사항	77
				14.	각종 공사 설계변경 상황	78
				15.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상)	79
				16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	81
				17.	국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)	82
				18.	지방보조금 성과평가 내역	83
				19.	2021년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역	84

			20.	2022년 명시 이월 내역	86
			21.	2022년도 명시이월(의회 제출) 후 2021년도에 집행한 내역	87
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황	87
			23.	공사 준공기한 연장 내역	88
			24.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	88
			25.	국․도비 반납 현황 및 사유(2021년도 반납건)	89
			26.	2021년도 계획사업중 미착공사업 현황	90
			27.	2021년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	91
			28.	2021년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업	91
			29.	2021년도 예산편성후 전액 미집행 내역	92
			30.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황	92
			31.	소송 사건 현황	93
			32.	시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	94
			33.	시설·사무 민간위탁 현황	97
			34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황	98
			35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업현황	98
			36.	시 산하 재단 설립 현황	99
			37.	업무협약(MOU) 등 체결 현황	99

하 수 도 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	하수도사업 공기업 운영사항	103
				2.	하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황	104
				3.	하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)	106
				4.	하수찌꺼기 감량화사업	107
				5.	유천 생태습지 유지관리	108
				6.	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로정비사업	109
				7.	남부2-1, 2-2배수분구 하수관로정비사업	110
				8.	북부1처리분구 하수관로 정비사업	111
				9.	익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	112
				10.	국가산업단지 노후하수관로 정비사업	113
				11.	공공하·폐수처리시설 운영관리(BTO)	114
				12.	공공하·폐수처리시설 관리대행	115
				13.	소규모 하수도 시설 정비 공사	116
				14.	지하수 이용부담금 부과·징수 현황	120

감사자료 과 공통사항

1. 2021년도 업무성과 및 반성

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율 개선

‣ 남부2·3, 북부2처리분구 정비사업 추진 : 오수관로 21.6km, 배수설비 1,721개소

‣ 남부2-1, 2-2배수분구 정비사업 추진 : 오수관로 15.3km, 배수설비 1,290개소

‣ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 설계 완료(행정절차 이행)

◦ 공공하·폐수처리시설 최적 운영을 통한 수질 및 환경 개선

‣ 하·폐수처리시설 시설 개·보수를 통한 효율 증대

‣ 하·폐수처리시설 정상 가동 및 법정 방류 수질 유지

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 추진

‣ 시설공사와 건설사업관리용역 추진 : 탈수기동 및 농축조 철거, 탈취기 설치 등

‣ 기계, 전기, 토목 등 관급자재 구입 : 탈황설비 및 가스저장조. 승온장치 등

◦ 읍면동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 하수도 정비공사 L=2.75km, 하수도기계준설 3,815㎥

‣ 365일 상시대기 근무로 2,835건의 하수도 생활민원처리

‣ 침수대비 및 원활한 통수를 위한 맨홀 및 하수도 준설 1,447건, 하수도 점검 및 소규모 시설 보수 853건

□ 반      성

◦ 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 환경부 재원협의 지연에 따른 착공 지연

‣ 향후 동일한 사례가 발생 되지 않도록 사업성 검토, 사전 행정절차 등 이행에 철저를 기하겠음

2. 2021년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

(단위:천원,%)

장	관	항	세항	예 산 현 액						지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계(A)	2021 예산액	계속비 이월액	건설개량 이월액	사 고 이월액	예비비 사용액
하수도과				84,802,891	71,728,325	9,071,216	4,020,547	12,803	0	66,527,031	17,570,886	0	704,974	78.4
	사업비용			36,426,190	36,426,190					36,143,330			282,860	99.2
		영업비용		36,276,190	36,276,190					36,143,330			132,860	99.6
			관거비	14,791,785	14,791,785					14,734,720			57,065	99.6
			처리 장비	18,975,073	18,975,073					18,973,194			1,879	99.9
			일반 관리비	2,509,332	2,509,332					2,435,416			73,916	97.1
		예비비		150,000	150,000					0			150,000	0
	자본적지출			48,376,701	35,302,135	9,071,216	4,020,547	12,803	0	30,383,701	17,570,886	0	422,114	63
		유형자산 취득		44,018,543	32,280,295	9,071,216	2,667,032			26,361,824	17,570,886		85,833	60
			구축물	43,918,543	32,180,295	9,071,216	2,667,032			26,261,824	17,570,886		85,833	60
			건설 중인 자산	100,000	100,000					100,000			0	100
		비가동설비 자산취득		1,864,901	1,882,098			12,803		1,784,339			80,562	95.6
		기타자본적 지출		2,243,257	889,742		1,353,515			2,237,538			5,719	99.7
		예비비		250,000	250,000					0			250,000	0

(참고) 2021년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부 진 사 유
1	구축물	43,918,543	26,261,824	60	‧재원 협의 등 행정절차 추진으로 이월액 발생

3. 2021년도 행정사무감사 시 지적사항에 대한 조치 결과

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
계	11건
1	•하수도사용료 현실화 관련 ▸하수도 사용료 인하 이후로 현실화율이 계속 낮아지고 있는데, 장기적으로 현실화율 제고를 위한 개선대책을 마련하기 바람	▸BTO, BTL 장기부채 상환으로 총괄원가 비용부담이 높아 현실화율 제고에 어려움이 있으며, 지속적으로 비용부담을 줄여 현실화율이 낮아지는 것을 최소화하겠음
2	•노후 하수관으로 발생하는 씽크홀 대책 마련 ▸구도심의 경우 하수관이 노후되어 크고 작은 씽크홀이 많이 발생하고 있어 철저한 조사를 통해 씽크홀이 발생되지 않도록 노력하기 바람	▸구도심 노후하수관로에 대하여 노후관로 정밀조사용역을 실시하고 있으며, 조사 결과에 따라 노후하수관로 정비계획을 수립하여 씽크홀이 발생되지 않도록 노력하겠음
3	•장마철 대비 준설 작업 관련 ▸장마철 대비 준설작업을 조속히 진행하여 재해가 발생되지 않도록 노력하기 바람	▸2022년 상반기 준설 연장은 22㎞이며, 우기철 대비 기계준설공사 3건을 발주하여 침수 발생을 최소화 하도록 노력하겠음
4	•소송사건 현황 관련 ▸하수도 맨홀뚜껑관련 사건사고가 발생되고 있어 재발방지를 위한 대책을 마련하기 바람	▸집중강우시 물 압력으로 인해 맨홀뚜껑이 튀어오른 경우이며, 돌발상황은 예측하기 어려우나 재발 방지를 위하여 노력하겠음
5	•공중화장실 안심스크린 설치 관련 ▸익산시 공중화장실 등의 불법촬영 예방 조례 제정 이후 공중화장실에 안심스크린이 설치되고 있어 앞으로도 공중화장실 관리 감독에 철저를 기하기 바람	▸신설 화장실에는 의무적으로 설치하고 기존 화장실은 공무원과 경찰이 합동점검반을 편성해 정기적으로 불법 촬영장치 여부 등을 점검하고 있음
6	•하수도 악취문제 관련 ▸하수도 악취 민원이 많이 발생하고 있는바, 민원인이 신고하기 전에 악취방지 뚜껑을 설치하여 민원이 최소화 되도록 노력하기 바람 ▸오ㆍ우수 분류 후에도 악취가 발생하고 있어 근본적인 해결책 마련을 위해 노력하기 바람	▸악취의 근본적인 문제를 해결하기 위해선 분류식 하수관로 정비공사를 완료해야 함에 따라 지속적으로 정비공사를 추진하겠음 ▸구도심 일부 건물은 구조적인 문제로 인하여 분류공사를 진행하지 못하였음
7	•남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업 ▸하수관로 정비사업이 진척 없이 사업기간이 연장되고 있어 조속히 사업이 추진될 수 있도록 노력하기 바람	▸환경부 재원협의 과정이 8개월 정도 소요되어 지연되었으나, 환경부와 전북지방환경청을 방문하는 등 노력하여 2021년 5월에 재원 협의가 완료되었고 공사 발주하여 9월 29일 착공하였음
8	•금마하수처리장 증설 관련 ▸2008년에 준공되고 13년밖에 지나지 않았는데 벌써 증설을 해야 한다는 것은 근시안적 행정행위에서 비롯되었다고 생각하며, 증설을 위해서는 천마마을 주민들의 이해와 협조가 반드시 필요하므로 지속적인 대화를 통해 문제가 해결될 수 있도록 노력하기 바람	▸금마지역에 아파트 건설 및 미륵사지 관광지 조성사업 등으로 인하여 하수 발생량이 증가됨에 따라 중설이 필요한 것임. 주민들과의 지속적인 대화를 통해 처리해 나가도록 노력하겠음
9	•빗물저금통 사업 관련 ▸빗물저금통 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 예산 확보 등 노력에 철저를 기하기 바람	▸현재 소형 빗물이용시설 설치 지원사업을 진행하고 있으며 원활하게 진행되도록 노력하겠음
10	•유천생태습지 운영 관련 ▸많은 시민들이 유천생태습지를 이용하고 있으나 예산 투자 대비 효과나 성과 등을 면밀히 검토한 후 최소의 비용 투입으로 최대의 효과를 낼 수 있도록 노력하기 바람	▸유지관리 예산이 2019년 3억5천만원, 2020년 3억6천만원이었으나 2021년도에는 1억원이며 앞으로 최소비용으로 유지·관리할 수 있도록 노력하겠음
11	•노후산단 구조 고도화 사업 관련 ▸국가산업단지 내 공동주택의 하수도 요금 문제와 관련하여 환경부와 협의를 통해 공동주택 주민들이 피해를 입지 않도록 노력하기 바람	▸주민들의 요청에 따라 「공공폐수처리시설 운영 및 비용부담 조례」를 개정하여 국가산업단지 내 공동주택도 일반주거지역과 동일하게 하수도 사용료를 부과하고 있음

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□

4. 2021년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
1	지방계약법상 수의계약 체결 불가대상 계약 추진	▸계약 체결 시 수의계약 제한대상자 여부 등을 면밀히 검토한 후 업무를 추진하겠음	감사원 감사
2	남부2‧3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 추진 부적정	▸과다 계상된 공사비(잔여분) 전체분 설계변경 5회 반영(감액) - 하수도과-20542(2021.12.15.)호 ▸과다 계상된 공사비(1ㆍ2차분) 반납 완료(2022.3.31.) ▸과다 계상된 폐기물처리용역비(잔여분) 전체분 설계변경 5회 반영(감액) - 하수도과-20542(2021.12.15.)호 ▸과다 계상된 폐기물처리용역비(1ㆍ2차분) 반납 완료(2022.2.17.)	전라북도 종합감사

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

발언 의원 / 발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
김용균 /236회	∙중앙동 전통시장 일대 침수피해에 대한 익산시의 신속한 피해복구 및 향후 재발방지 대책 마련 요구	▸침수피해 조사완료 보상대상 결과 (303건 중 295건 완료, 7건 연락 불가, 1건 민사소송진행 중) ▸집중호우 시 침수피해를 최소화하기 위하여 관리에 최선을 다하겠음
장경호 /236회	∙익산시 중앙동 일원 침수피해 원인 규명과 관련하여
박철원 /237회	∙송학동 상습 침수구역에 대한 근본적 대책 마련 촉구	▸주기적인 하수관로 준설 시행으로 하수관로 내 퇴적물 우기 전 제거 시행 ▸송학동에서 시행 및 계획중인 공동주택 신축시 원인자 부담공사로 하수관로 신설 및 개량 시행 ▸송학동 영무예다음 인근 우수박스 개량을 위해 10억원을 2021년 결산 추경 편성 ▸익산시 하수도정비 기본계획에 의거 중장기적으로 우·오수 관로 실선 및 개량 (D=450~1000mm, L=8,693m) 시행 ※ 소요예산 10,300백만원

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□

연번	시정질문사항	조치(처리)결과	비고
1	∙해마다 반복되는 용제동 용연마을 일원 침수문제 해결	[처리불가] ▸용연마을 앞 농어촌공사 대간선수로는 하수도법 규정에 의한 하수도시설이 아니므로 하수도 정비사업으로 수로 복개는 곤란한 실정임	한동연 의원

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□

□ 개정 조례

연 번	조례명	개정일자	발의의원	추진현황	비 고
1	익산시 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담 조례 일부개정조례안	2021.04.05.	한동연	▸제1, 2산업단지 입주기업 폐수관로 사용료 부과개시
2	익산시 물의 재이용 촉진 및 지원 조례 일부개정조례안	2021.04.05.	김충영	▸공포완료 ▸빗물이용시설을 설치할 경우 제7조에 따른 재정지원 여부 검토

8. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사 업 개 요	사업기간	총사업비	시공회사	공정률
계	54건		41,081
남부2,3북부2처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 8.45km, 배수설비 1,415가구	2021. 1. ~ 2022. 1.	7,559	성지건설(주)	100
2021년 하수시설 민원처리 1차 단가계약	하수시설공사 관련 69개 공종	2021. 2. ~ 2021. 5.	47	(유)대길환경	100
함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사	오수관로 0.58km, 배수설비 64가구	2021. 4. ~ 2021. 9.	360	(유)신용건설	100
남부2,3북부2처리분구 하수관로 정비사업 전기공사(3차분)	맨홀펌프장 설치 1개소, 자가펌프장 15개소, 유량계 2개소	2021. 4. ~ 2022. 9.	122	㈜자연에너지	80
2021년 하수시설 민원처리 3차 단가계약	하수시설공사 관련 35개 공종	2021. 6. ~ 2021. 8.	46	㈜성원건설	100
남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업(1차분)	오수관로 1.272km, 비굴착 전체보수 0.492km, 부분보수 938개소, 배수설비 136가구	2021. 9. ~ 2022. 11.	1,936	㈜한반도건설	70
2021년 하수시설 민원처리 5차 단가계약	하수시설공사 관련 35개 공종	2021. 9. ~ 2021. 11.	47	(유)신풍건설	100
익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업	소화조 신설 등 (6,692㎥/일) 1식	2019. 8. ~ 2022. 10.	26,844	(주)금도건설	57
익산공공하수 차집관로 보수공사	차집관로 보수 L=172m	2021 4. ~ 2021. 4.	168	(유)엠제이이엔씨	100
3산업단지 공공폐수처리시설 탈수기 보수공사	탈수기 노후에 따른 주요부품 교체	2021. 4. ~ 2021. 5.	67	㈜시호이엔씨	100
익산공공하수 3중계펌프장 탈취기 개선공사	탈취기 개선 1식	2021. 6. ~ 2021. 8.	140	㈜광산테크	100
3산업단지 공공폐수처리시설 송풍기 보수공사	송풍기 노후에 따른 주요부품 교체	2021. 9. ~ 2021. 10.	31	한국터보기계 서비스센터	100
익산공공하수 총인처리시설 여과기 여재교체	여과기 여재 및 설비 교체 공사 1식	2021. 10. ~ 2021. 12.	179	㈜하나엔텍	100
익산북부공공하수 유입펌프 인버터 설치공사	인버터설치 1식	2021. 10. ~ 2021. 12.	165	㈜두연테크	100
공공하폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역	익산하수 외 5개소	2021. 11. ~ 2022. 11.	337	㈜서인지엔티	69
공공하폐수처리시설 및 중계펌프장 통합모니터링 시스템 설치공사	하폐수시설물 21개소 원격제어설비 구축 및 프로그램업데이트	2021. 11. ~ 2022. 4.	213	㈜서인지엔티	100
3산업단지 공공폐수처리시설 분리막 교체공사(자재)	폐수처리장 생물반응조 분리막 노후에 따른 교체	2021. 12. ~ 2022. 3.	609	유한회사 상선	100
3산업단지 공공폐수처리시설 분리막 교체공사(설치공사)	폐수처리장 생물반응조 분리막 노후에 따른 교체	2021. 12.. ~ 2022. 4.	82	㈜하나엔텍	100
2021년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 15개소	2021. 1. ~ 2021. 4.	47	(주)주원건설	100
2021년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 13개소	2021. 1. ~ 2021. 3.	47	(유)은산	100
2021년 상반기 맨홀보수공사 단가계약	맨홀정비 51개소	2021. 2. ~ 2021. 5.	46	(유)세진건설	100
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약 3차	준설토 124㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)주신테크	100
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 110㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)엠제이이엔씨	100
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(4차)	준설토 115㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)보건	100
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	준설토 107㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)한국티엠에스	100
2021년 주민생활 편익사업 단가계약 3차	하수도정비 11개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(주)유성산업	100
2021년 주민생활 편익사업 단가계약 2차	하수도정비 9개소	2021. 3. ~ 2021. 6.	44	(유)정진건설	100
2021년 주민생활 편익사업 단가계약 1차	하수도정비 16개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)성진건설	100
2021년 상반기 하수도정비공사 단가계약 2차	하수도정비 14개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(주)건지토건	100
2021년 상반기 하수도정비공사 단가계약 3차	하수도정비 13개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	㈜신토성건설	100
2021년 상반기 하수도정비공사 단가계약 1차	하수도정비 10개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)익산환경건설	100
2021년 상반기 맨홀보수공사 단가계약(2차)	하수도정비 48개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	47	(합)신한건설	100
2021년 하수도 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 5개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	41	선진산업	100
2021년 하수도 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 15개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	47	(유)한국티엠에스	100
2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 1차	준설토 103㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	(유)주신테크	100
2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 3차	준설토 108㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	(유)주신테크	100
2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 107㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	(유)엠제이이엔씨	100
2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 5차	준설토 110㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	㈜신성토건	100
2021년 하반기 하수도기계 준설공사 단가계약 4차	준설토 124㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	47	㈜신성토건	100
2021년 하반기 하수도기계 준설공사 단가계약 2차	준설토 112㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	47	㈜송민건설	100
2021년 하반기 하수도기계 준설공사 단가계약 3차	준설토 107㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	47	(유)광우건설	100
2021년 하수도 생활환경개선사업 단가계약 1차	하수도정비 13개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	40	㈜서경건설	100
2021년 하수도 생활환경개선사업 단가계약 2차	하수도정비 16개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	47	(유)한성건설	100
2021년 하반기 맨홀보수공사 단가계약	하수도정비 35개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	38	(유)씨엘	100
2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비 18개소	2021. 11. ~ 2022. 1.	47	㈜신성토건	100
2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비 14개소	2021. 11. ~ 2022. 1.	47	(유)광우건설	100
2021년 동절기 하수도기계 준설공사 단가계약(1차)	준설토 75㎥	2021. 11. ~ 2022. 2.	34	㈜삼일공사	100
2021년 동절기 하수도기계 준설공사 단가계약(2차)	준설토 83㎥	2021. 11. ~ 2022. 2.	38	(유)대길환경	100
익산시노후하수관로정밀조사용역2단계(모현동)	하수관로정밀조사 L=11.5km	2021. 3. ~ 2021. 9.	74	㈜대아이엔지	100
익산시노후하수관로정밀조사용역2단계(국가산단,어양동,부송동)	하수관로정밀조사 L=10.2km	2021. 7. ~ 2022. 1.	88	㈜동운	100
익산시노후하수관로정밀조사용역2단계(송학동)	하수관로정밀조사 L=24.3km	2021. 3. ~ 2021. 9.	121	㈜국성건설 엔지니어링	100
익산시노후하수관로정밀조사용역2단계(어양동, 부송동)	하수관로정밀조사 L=29.9km	2021. 6. ~ 2021. 12.	141	㈜대아이엔지	100
익산시노후하수관로정밀조사용역2단계(신동)	하수관로정밀조사 L=33.6km	2021. 3. ~ 2021. 9.	164	㈜대아이엔지	100
익산시노후하수관로정밀조사용역2단계(영등동)	하수관로정밀조사 L=33.2km	2021. 3. ~ 2021. 9.	179	㈜국성건설 엔지니어링	80

9. 2021년도 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

건 명	내 용	진정인	조치 사항	처 리 결 과
계	4건
하수관로 사유지 침해(2021. 06. 24.)	개인소유의 토지 내에서 시공한 것에 대해 원상복구 요청	하**	완료	영등동 230-9번지 상 개인소유의 토지 내에서 하수관로 연결관을 시공한 것에 대해 원상복구 시행
사유지내 하수관로 설치(2021. 01. 05.)	본인 토지 내 하수관로 설치관련 문의	정**	완료	새마을사업추진을 위해 당시 소유주의 동의하에 토지분할 및 지목변경이 된 도로에 기반시설 설치된 것으로 판단
신동마을 우수유입 반대 (2021. 07. 23.)	낭산면 내·외돈마을 우수 유입 반대(신동마을)	이**, 임**외 15명	완료	공사 중지
신동마을 우수관로 공사 진행 요청 (2021. 08. 26.) (2021. 09. 09.) (2021. 09. 30.) (2021. 12. 14.)	낭산면 신동마을주민, 우수관로 매설 토지주 반대로 인한 중지된 공사 진행 요청	최**, 이**	완료	신동마을 우수 유입반대로 공사 진행 못하고, 기존 우수관로에 우수관 연결 후 복개하여 공사 완료

10. 기금 운용 관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

12. 용역사업 관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

용역의뢰건명	용역업체	총사업비	계약방법	비 고
계	35건	4,429
2021년 유천생태습지 청소용역	중앙종합공사	18	수의계약	하수시설
남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역	(주)초당산업	304	일반경쟁
남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 CCTV조사및수밀시험용역	주식회사 씨.엔.코리아건설	145	일반경쟁
익산북부1처리분구 하수관로 정비사업 기본및실시설계용역	주식회사 도화엔지니어링	832	일반경쟁
남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계(설계안전성검토)용역	주식회사 주한건설기술단	19	수의계약
함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사 CCTV촬영 및 수밀시험용역	(유)보건	18	수의계약
함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사 폐기물처리용역	(주)일진도시환경	42	수의견적
함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사 GIS DB구축용역	유한회사 산야	6	수의계약
유천생태습지유지관리 (2021년해충방제용역)	(유)현대그린환경	9	수의계약
북부1처리분구 하수관로 정비사업 설계경제성(VE) 검토용역	주식회사 동운	18	수의계약
익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	동부엔지니어링 주식회사	730	일반경쟁
익산시 도시계획시설(주차장) 결정 용역	주식회사 태원엔지니어링	43	수의계약 (여성기업)	하수시설
북부1처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 설계안전성 검토용역	주식회사 동운	26	수의견적
남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역(폐합성수지)	유한회사 계룡환경산업	17	수의계약
남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 GIS DB 구축용역	유한회사 아라기술공사	49	수의견적
금마공공하수처리장증설사업 기본 및 실시설계용역	주식회사 동해종합기술공사	779	일반경쟁
남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 안전관리계획서 검토용역	(유)가온기술	1	수의계약
익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로정비사업 폐기물처리용역	백진환경 합자회사	101	일반경쟁
공공하폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역	㈜서인지엔티	337	일반경쟁	하수운영
익산하수찌꺼기 감량화사업 소화조 준설폐기물(무기성오니) 처리용역	자연환경	35	수의견적
익산하수찌꺼기 감량화사업 소화조 준설폐기물 소각처리용역	(주)엔아이티	23	수의견적
낭산면 노동마을 하수관 설치공사 건설폐기물 처리용역	(유)가나환경	4	수의계약	하수관리
모현동1가 122-3번지 일원 하수관로 정비공사 건설폐기물 처리용역	(유)가나환경	8	수의계약
2021년 상반기 하수도 CCTV 촬영용역 단가계약	태광건설(주)	10	수의계약
목천동 우수박스 설치공사 실시설계용역	㈜주한건설기술단	13	수의계약
2021년 하수도시설 정비공사 (도비지원사업 외 하수관로 정비공사) 실시설계용역	㈜태원엔지니어링	15	수의계약
금마면 노후우수관로 정비공사 실시설계용역	㈜동운	17	수의계약
금마시장 노후하수관로 정비공사 건설폐기물 처리용역	일진도시환경(주)	21	수의계약
2021년 하반기 하수도 CCTV 촬영용역 단가계약	(유)보건	22	수의계약	하수관리
익산시 노후하수관로 정밀조사용역 2단계(모현동)	㈜대아이엔지	74	수의견적
익산시 노후하수관로 정밀조사용역 2단계(국가산단,어양동,부송동)	㈜동운	88	수의견적
익산시 노후하수관로 정밀조사 용역 2단계(송학동)	㈜국성건설엔지니어링	121	일반경쟁
익산시 노후하수관로 정밀조사용역 2단계(어양동, 부송동)	㈜대아이엔지	141	일반경쟁
익산시 노후하수관로 정밀조사용역 2단계(신동)	㈜대아이엔지	164	일반경쟁
익산시 노후하수관로 정밀조사용역 2단계(영등동)	㈜국성건설엔지니어링	179	일반경쟁

13. 인․허가 민원관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당   없  음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

날 짜	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증․감
계	7건	42,121	25,166	27,070	1,906
2021. 08.31.	함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사	536	363	374	11	(유)신용건설	2021. 4. ~ 2021. 10.	오수관로 계획 변경등에 따른 수량 변경 반영
2021. 09.06.	남부2,3 북부2처리분구 하수관로 정비사업.(전체분4회, 3차분2회)	6,861	6,544	6,861	317	㈜성지건설	2021. 1. ~ 2022. 1.	물가변동 계약금액조정 반영 및 공사 수량 증ㆍ감 반영
2021. 12.15.	남부2,3 북부2처리분구 하수관로 정비사업 (전체분5회, 3차분3회)	7,559	6,861	7,559	698	㈜성지건설	2021. 1. ~ 2022. 1.	추가사업비 (국ㆍ도비) 확보 및 물가변동, 전라북도 종합감사 지적사항 반영 등에 따른 수량 변경 반영
2021. 10.07.	익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업시설공사	26,844	9,818	10,635	817	㈜금도건설	2019. 8. ~ 2022. 10.	물가변동(ES) 및 현장여건 반영
2021. 10.12.	익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업전기계측공사		1,437	1,483	46	㈜세움지	2019. 8. ~ 2022. 10.	물가변동(ES)반영
2021. 09.23.	성당면 내난마을 하수관로 정비공사	21	16	15	△1	㈜송민건설	2021. 6. ~ 2021. 9.	아스콘 포장 물량 감소
2021. 11.08.	금마시장 노후하수관로 정비공사	300	127	143	16	(유)보건	2021. 4. ~ 2021. 11.	현장 여건에 따라 현장 타설 구간 증가, 복구포장 관련 민원 발생으로 아스팔트 덧씌우기 물량 증가

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	총사업비	집행액	시공회사
계	37건		11,560	10,556
남부2,3북부2처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 8.45km, 배수설비 1,415가구	2021. 1. ~ 2022. 1.	7,559	7,559	성지건설(주)
2021년 하수시설 민원처리 1차 단가계약	하수시설공사 관련 69개 공종	2021. 2. ~ 2021. 5.	47	47	(유)대길환경
함열읍 미력마을 분류식 배수설비 설치공사	오수관로 0.58km, 배수설비 64가구	2021. 4. ~ 2021. 9.	360	360	(유)신용건설
남부2,3북부2처리분구 하수관로 정비사업 전기공사(3차분)	맨홀펌프장 설치 1개소, 자가펌프장 15개소, 유량계 2개소	2021. 4. ~ 2022. 9.	122	0	㈜자연에너지
2021년 하수시설 민원처리 3차 단가계약	하수시설공사 관련 35개 공종	2021. 6. ~ 2021. 8.	46	46	㈜성원건설
남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업(1차분)	오수관로 1.272km, 비굴착 전체보수 0.492km, 부분보수 938개소, 배수설비 136가구	2021. 9. ~ 2022. 11.	1,936	1,135	㈜한반도건설
2021년 하수시설 민원처리 5차 단가계약	하수시설공사 관련 35개 공종	2021. 9. ~ 2022. 11.	47	47	(유)신풍건설
2021년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 15개소	2021. 1. ~ 2021. 4.	49	47	(주)주원건설
2021년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 13개소	2021. 1. ~ 2021. 3.	49	47	(유)은산
2021년 상반기 맨홀 보수공사 단가계약	맨홀정비 51개소	2021. 2. ~ 2021. 5.	49	46	(유)세진건설
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약 3차	준설토 124㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(유)주신테크
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 110㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(유)엠제이이엔씨
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(4차)	준설토 115㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(유)보건
2021년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	준설토 107㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(유)한국티엠에스
2021년 주민생활 편익사업 단가계약 3차	하수도정비 11개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(주)유성산업
2021년 주민생활 편익사업 단가계약 2차	하수도정비 9개소	2021. 3. ~ 2021. 6.	49	44	(유)정진건설
2021년 주민생활 편익사업 단가계약 1차	하수도정비 16개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(유)성진건설
2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 2차	하수도정비 14개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(주)건지토건
2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 3차	하수도정비 13개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	㈜신토성건설
2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 1차	하수도정비 10개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	49	47	(유)익산환경건설
2021년 상반기 맨홀 보수공사 단가계약(2차)	하수도정비 48개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	49	47	(합)신한건설
2021년 하수도 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 5개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	49	41	선진산업
2021년 하수도 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 15개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	49	47	(유)한국티엠에스
2021년 우기철 대비 하수도 기계준설공사 단가계약 1차	준설토 103㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	49	47	(유)주신테크
2021년 우기철 대비 하수도 기계준설공사 단가계약 3차	준설토 108㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	49	47	(유)주신테크
2021년 우기철 대비 하수도 기계준설공사 단가계약 2차	준설토 107㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	49	47	(유)엠제이이엔씨
2021년 우기철 대비 하수도 기계준설공사 단가계약 5차	준설토 110㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	49	47	㈜신성토건
2021년 하반기 하수도기계준설공사 단가계약 4차	준설토 124㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	49	47	㈜신성토건
2021년 하반기 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 112㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	49	47	㈜송민건설
2021년 하반기 하수도기계준설공사 단가계약 3차	준설토 107㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	49	47	(유)광우건설
2021년 하수도 생활환경개선 사업 단가계약 1차	하수도정비 13개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	49	40	㈜서경건설
2021년 하수도 생활환경개선 사업 단가계약 2차	하수도정비 16개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	49	47	(유)한성건설
2021년 하반기 맨홀 보수공사 단가계약	맨홀정비 35개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	40	38	(유)씨엘
2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비 18개소	2021. 11. ~ 2022. 1.	49	47	㈜신성토건
2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비 14개소	2021. 11. ~ 2022. 1.	49	47	(유)광우건설
2021년 동절기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 75㎥	2021. 11. ~ 2022. 2.	40	34	㈜삼일공사
2021년 동절기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	준설토 83㎥	2021. 11. ~ 2022. 2.	40	38	(유)대길환경

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

17. 국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업 개요	사업 기간	2021년 예산액				집행액
			계	국비	도비	시비
계	8건		27,566	18,827	2,196	6,543	19,941
남부2ㆍ3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업	오수관로30.5km, 배수설비 2,646개소	2017. 1. ~ 2022. 12.	10,869	7,627	327	2,915	9,558
남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업	오수관로 15.3km, 배수설비 1,694개소	2019. 1. ~ 2024. 12.	2,732	1,366	136	1,230	1,146
북부1처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 35.6km, 배수설비 2,648개소	2020. 1. ~ 2024. 12.	1,153	1,010	43	100	791
익산시 금마 하수 처리시설 증설	금마공공하수 처리시설 증설 Q=1,100㎥ ⇒Q=1,600㎥	2021. 1. ~ 2023. 12.	429	300	65	64	126
익산공공하수처리 시설 하수찌꺼기 감량화사업	소화조 신설 등 (6,692㎥/일) 1식	2019. 8. ~ 2022. 10.	9,563	7,114	1,524	925	7,105
익산시 노후하수관로 정비사업	하수관로정비 L=1.3km	2019. 1. ~ 2021. 12.	1,026	513	51	462	583
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	하수관로정비 L=2.63km	2020. 10. ~ 2023. 12.	1,000	500	50	450	0
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계)	하수관로 정밀조사 L=110km	2021. 1. ~ 2021. 12.	794	397	0	397	632

18. 지방보조금 성과평가 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

19. 2021년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	사업기간	이월액	집행액	공정률	비고
계	14건		4,033	3,107
모현e편한 배수설비 설치공사(주민참여예산)	하수관로 171m, 배수설비 3개소, 맨홀펌프장 5개소	2020.3 ~ 2020.7	42	108	100	건설개량 (명시)
익산시 하수도정비기본계획 수립 용역	하수도정비 기본계획 수립 1식	2019. 1. ~ 2021. 12.	13	13	100	건설개량 (명시)
익산시 금마 공공하수 처리시설 증설	금마공공하수 처리시설 증설 Q=1,100㎥⇒Q=1,600㎥	2021. 1. ~ 2023. 12.	270	270	100	건설개량 (명시)
천서왕궁지구 하수관거 정비사업 국고보조금 정산 잔액 반납	하수관로 44.0km, 배수설비 815가구, 맨홀펌프장 34개소	2015. ~ 2019.	1,313	1,313	100	건설개량 (명시)
오산문화마을 하수관거 정비사업 금강수계기금 정산 잔액 반납	하수관로 5.4km, 배수설비 87가구	2016. 3. ~ 2018. 12.	40	40	100	건설개량 (명시)
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	익산시 일원 미시공 가구 분류식 배수설비 설치	2021. 1. ~ 2021. 12.	13	13	100	사고
익산공공하수처리시설 내진성능평가 용역	기존시설물 55개소 내진성능평가	2020. 10. ~ 2021. 3.	27	27	100	건설개량 (명시)
TOC 측정기 구입	TOC측정기 교체 5대 (실험실4대, TMS1대)	2020. 10. ~ 2021. 4.	138	104	100	건설개량 (명시)
익산시 노후 하수관로 정비사업	하수관로정비 L=1.3km	2019. 1. ~ 2021. 12.	576	576	100	건설개량 (명시)
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 실시설계용역	하수관로정비 L=2.63km	2020. 10. ~ 2023. 12.	65	0	0	건설개량 (명시)
익산시 노후하수관로 정밀조사용역	하수관로 정밀조사 L=110km	2020. 1. ~2020. 12.	225	225	100	건설개량 (명시)
국가산업단지 노후 하수관로 정비공사	하수관로정비 L=13.5km	2020. 1. ~ 2024. 12.	893	0	0	건설개량 (명시)
읍면동지역 생활하수관련 민원처리	하수도정비 36개소 관급자재구입	2020. 11. ~ 2021. 3.	200	200	100	건설개량 (명시)
하수도 기계준설	준설토 476㎥	2020. 11. ~ 2021. 3.	218	218	100	건설개량 (명시)

20. 2022년 명시이월 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업기간	총사업비	이월액	현공정(%)	비고
계	10건		7,325	3,213
송학동 우수박스 정비사업	2.0×1.5 m 우수박스 설치 L=380m	2022. 1. ~ 2022. 12.	1,000	1,000	80 (실시설계)	하수시설
금마면 용순길 22-6 주변 하수관로 정비공사 (특별조정교부금)	하수관로 신설 L=200m	2021. 8. ~ 2022. 12.	100	100	착공 (공사 중지중)
관내 분류식 배수설비 설치공사	익산시 일원 미시공 가구 분류식 배수설비 설치	2022. 1. ~ 2022. 12.	946	120	공사 추진중
유천생태습지 주차장 설계용역	조성면적 4,847㎡, 주차장 127면, 화장실 1개소	2021. 8. ~ 2022. 12.	80	80	95 (실시설계)
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계)	하수관로 정밀 조사 L=110km	2021. 1. ~ 2021. 12.	794	162	80	하수관리
익산시 노후하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=1.3km	2019. 1. ~ 2021. 12.	1,026	443	100
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	하수관로 정비 L=2.63km	2020. 10. ~ 2023. 12.	1,000	1,000	0 (실시설계)
우수관로, 맨홀 악취저감 뚜껑 정비공사	맨홀정비 35개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	50	40	100
하수도 기계준설	준설토 158㎥	2021. 11. ~ 2022. 3.	700	80	100
읍면동 하수도시설 정비공사	하수도정비 29개소 관급자재구입	2021. 9. ~ 2022. 1.	1,629	188	100

21. 2022년 명시이월(의회제출) 후 2021년도에 집행한 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

22. 예산 이용, 전용 사항 및 예비비 건별 집행 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□

해  당  없  음

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

24. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액  반납한 예산현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유(2021년도 반납건)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 2021년도 반납건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	262,345,000	11,629,000	2,128,826	68,086
천서왕궁지구 하수관거 정비사업 국고보조금 정산 잔액 반납	17,840,000	765,000	1,510,000	62,705	2020년도 집행잔액 (낙찰차액)
익산시 하수관로 정비 임대형 민자사업(09BTL)	82,017,000	3,672,000	158,114	-	2019년도 정산 잔액
익산시 하수관로 정비 임대형 민자사업(09BTL)	82,017,000	3,672,000	460,087	-	2020년도 정산 잔액
익산시 하수관로 정비 임대형 민자사업(06BTL)	80,471,000	3,520,000	625	5,381	2020년도 정산 잔액

□ 2022년도 반납 예정건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 예 정 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	25,543,000	1,115,000	1,500,000	65,476
남부2ㆍ3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업	25,543,000	1,094,000	1,500,000	64,244	2021년도 집행잔액 (낙찰차액)
2021년 주민참여예산 도비보조금 정산	-	21,000	-	1,232	2021년도 정산 잔액

26. 2021년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

27. 2021년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

28. 2021년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

29. 2021년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	사업비	집행액	공정률	비고
계	1건	1,000	1,000	-	-
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	하수관로 정비 L=2.63km	1,000	1,000	-	-

※ 행정절차(공법선정 및 재원협의 등) 추진을 위한 실시설계용역 중지

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□

해  당  없  음

31. 소송 사건 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황
		원고	피고	일자	관할법원
구상금 청구 (광주지방법원 2020가소 604396)	주행 중 도로 및 횡단보도 근처 빗물이 고여있어 차량침수에 따른 구상금 청구	디비손해보험주식회사	익산시	2020. 11.09.	전주지방법원 군산지원	2022. 6. 22. 원고 청구 기각판결
구상금 청구 (서울남부지방법원2021가소 580750)	주차 중 도로 집중호우로 차량침수에 따른 구상금 청구	한화손해보험주식회사	익산시	2020. 10.05.	서울남부지방법원	2021. 11. 9. 답변서 제출
구상금청구 (전주지방법원 2020가소 72620)	부송동 제2공단사거리 인근 도로 주행 중 맨홀뚜껑이 열려있어 피보험차량의 파손된 사고	현대해상화재보험주식회사	익산시	2020. 12.28.	전주 지방 법원	2020.12.28. 소장 송달 2021.01.20. 답변서 제출 2021.06.01. 화해권고결정 ▸영조물배상공제 보험사고 자기부담금 지급(500천원)
구상금 청구 (서울중앙지방법원2021가소 2216825)	주차 중 도로 배수로 막힘으로 차량침수에 따른 구상금 청구	삼성화재해상 보험주식회사	익산시	2021. 11.02.	서울중앙지방법원	2021. 11. 29. 답변서 제출
구상금 청구 (서울중앙지방법원2021가소 2234854)	주차장 진입 중 맨홀뚜껑 이탈로 인한 차량파손에 따른 구상금 청구	디비손해보험주식회사	익산시	2021. 11.07.	서울중앙지방법원	2021. 12. 17. 답변서 제출
구상금 청구 (서울중앙지방법원2021가소 2409986)	주차 중 도로 배수로 막힘으로 차량침수에 따른 구상금 청구	삼성화재해상 보험주식회사	익산시	2021. 12.14.	서울중앙지방법원	2022. 1. 18. 답변서 제출

32. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
계	39건
현수막제거요청 (2021.02.08.)	유천생태습지내 현수막 제거요청	김**	완료	광고성 현수막 4개가 확인되어 제거완료(2021.02.09)
수달보호요청 (2021.03.31.)	유천생태습지 내 수달 보호요청	임**	완료	수달의 서식 환경을 포함 유천생태습지 기능 유지를 위해 지속적 관리(2021.04.01.)
도로포장문의 (2021.04.20.)	하수도 공사에 따른 도로포장 문의	정**	완료	도로포장의 일정 안내 (2021.04.21.)
산책로 청소요청 (2021.05.07.)	유천생태습지 산책로 흙먼지 청소 요청	오**	완료	나무식재 공사에 따른 흙먼지로 공사 완료 후 산책로 청소 완료(2021.05.07.)
하수도 협의 (2021.06.12.)	부송동 포레나 하수도 협의 관련 문의	최**	완료	단지 내 배수설비와 공공하수도 접속에 대한 협의 내용을 안내(2021.06.22.)
도로포장요청 (2021.06.21.)	과속방지턱 도색 및 아스팔트 포장 마무리 요청	백**	완료	아스팔트 포장 및 과속방지턱 페인트 도색의 일정 안내(2021.06.28.)
유천생태습지 소음민원 (2021.06.27.)	유천생태습지 공연으로 인한 소음민원	강**	완료	공연장 사용 단체 및 협회에 음량 조절 유의를 지시, 지도점검을 통한 소음규제단속(2021.06.29.)
유천생태습지 소음민원 (2021.06.28.)	유천생태습지 공연으로 인한 소음민원	강**	완료	소음규제 지시에 불응하는 단체에 공연을 허가하지 않는 방안 강구(2021.06.29.)
하수도 공사 관련 민원 (2021.07.26.)	하수도 공사 관련 민원	송**	완료	하수도 공사 지역과 민원인 연락처가 없어 공사 현장을 특정하기 어려워 재문의 요청(2021.07.28.)
악취 해소 요청 (2021.08.12.)	원룸 앞 정화조 넘침으로 인한 악취 해소 요청	권**	완료	동서로 41길 6-18의 배수설비 공사 일정 조율(2021.08.18.)
현수막제거요청 (2021.09.04.)	유천생태습지내 현수막으로 인한 안전사고 발생으로 제거 요청	이**	완료	2차 피해 발생에 대비하여 현수막 제거완료(2021.09.10.)
유천생태습지 이용 불편사항 (2021.09.09.)	유천생태습지 제초작업 요청	정**	완료	예초작업 완료(2021.09.13.)
지반침하 복구 요청 (2021.09.13.)	배수설비 공사 후 지반침하 복구 요청	남**	완료	하수관로 정비사업 구간으로 공사일정 조율하여 복구 조치(2021.09.23.)
피크닉 공간 조성 요청 (2021.11.02.)	유천생태습지 내 강아지존 및 피크닉 공간 조성 요청	류**	완료	유천생태습지의 조성 목적과 부합하지 않음을 안내(2021.11.02.)
복구 요청 (2021.11.03.)	배수설비 공사 중 담장 및 대문 파손건 복구 요청	이**	완료	담장 및 대문 파손에 대한 복구일정 안내(2021.11.10.)
집수정 정비 (2021.01.05.)	집수정 파손	최**	완료	집수정 보수 조치 완료(2021.01.07.)
집수정 준설 (2021.03.01.)	집수정 준설 요청	한**	완료	준설 완료(2021.03.05.)
침수 (2021.03.01.)	인근 토지주 주차장 공사로 인한 침수	이**	완료	해당 토지주와 원만한 합의 요청(2021.03.05.)
집수정 파손 (2021.03.27.)	집수정 파손	한**	완료	준설요청으로 준설하였으니, 관로 파손을 확인하여 공사 완료(2021.03.31.)
공사 불편사항 (2021.04.07.)	하수도 공사 사전 통보 관련	박**	완료	싱크홀 긴급 공사임을 설명드림(2021.04.14.)
집수정 준설 (2021.04.11.)	집수정 준설 요청	이**	완료	집수정 준설 완료(2021.04.16.)
응대 불만족 (2021.04.15.)	하수도 공사에 따른 민원응대 불만족	박**	완료	유선으로 확인 전화 후 공사 설명 완료(2021.04.19.)
맨홀 정비 (2021.04.28.)	맨홀뚜껑 파손	채**	완료	교체 완료(2021.04.29.)
오수 누수 (2021.05.23.)	오수 누수 보수 요청	홍**	완료	누수 지점 확인 후 공사 완료(2021.05.26.)
맨홀 정비 (2021.05.26.)	맨홀뚜껑 소음	문**	완료	보수 완료(2021.05.31.)
맨홀 정비 (2021.05.28.)	집수정 덮개 제거 요청	박**	완료	집수정 덮개 제거 완료(2021.06.01.)
침수 (2021.06.04.)	침수피해 방지 요청	성**	완료	기계준설완료((2021.06.05.)
맨홀 정비 (2021.06.26.)	악취방지뚜껑 교체 요청	성**	완료	현장 여건에 맞게 일부 교체 완료(2021.06.30.)
집수정 준설 (2021.07.17.)	집수정 준설 요청	황**	완료	집수정 준설 완료(2021.07.21.)
침수 (2021.07.19.)	집중호우로 인한 침수 피해	김**	완료	측구수로관 설치 및 우수관로 준설(2021.07.25.)
싱크홀 (2021.08.09.)	싱크홀 발생	강**	완료	안전조치 후 공사 완료(2021.08.12.)
집수정 준설 (2021.08.21.)	도로 측구 준설 요청	김**	완료	측구 준설 후 관로 기계준설 완료(2021.08.25.)
06BTL (2021.08.25.)	하도급공사 대금 지급 관련	정**	완료	2011년 완료된 공사로 원청과 하도급 관계는 시에서 관여하지 않았음을 설명(2021.08.30.)
침수 (2021.08.31.)	남중동 침수 해소 요청	박**	완료	2021년 8월 수문 조작용 밸브를 전달하였고, 2022년 6월 역류방지 수문 설치 완료(2021.09.08.)
침수 (2021.09.17.)	동남로얄아파트 상가 침수	고**	완료	맨홀 공사 완료 하였으며, 펌프 시설 설치 권고(2021.09.23.)
공사 불편사항 (2021.10.25.)	금마 하수도 공사 관련 소음 및 진동 민원	이**	완료	공사 중 기존 구조물 철거과정을 설명드리고, 민원 최소화를 약속드림(2021.10.29.)
09BTL 관리미흡 (2021.11.01.)	09BTL((주)청정익산) 맨홀펌프장 점검 후 관리 미흡	정**	완료	㈜청정익산 계도조치 완료(2021.11.03.)
오수관 준설 (2021.11.08.)	영등동 롯데마트 인근 역류 발생	김**	완료	기계준설 하였으나, 관로 파손으로 인한 역류 현상으로 공사 완료(2021.11.22.)
09BTL 관리미흡 (2021.11.19.)	09BTL((주)청정익산) 준설 후 물청소	정**	완료	㈜청정익산 계도조치 완료(2021.11.22.)

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□

□ 민간위탁현황

시설명	수탁기관	위‧수탁금액	동의 관련			비 고
			의회동의 여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
익산 공공하폐수처리시설	환경시설관리(주), (유)대신환경개발	2,941백만원/년	여 (익산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 제4조의 4)	2019. 09. 01. ~ 2022. 08. 31.	2020. 01. 01. ~ 2022. 08. 31.

□ 민간위탁 지도점검 현황

시설명	수탁기관	점검근거	점검일자	점검내용	지적사항	조치결과 (수탁기관)	비고
익산 공공하폐수처리시설	환경시설관리(주), (유)대신환경개발	익산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 시행규칙 제 14조	매월 10일	관리대행비 적정 사용여부, 처리수질 적정여부 등	-	-

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□

해  당  없  음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

36.  시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		김재숙	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		신현섭	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

해  당  없  음

감사자료 과 요구사항

1. 하수도사업 공기업 운영사항

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 현      황

◦ 자    산 : 금423,600백만원(자본 324,467  부채 99,133)

◦ 부채비율 : 30.55%(부채총계 / 자기자본 × 100)

⃞ 추 진 실 적

◦ 하수도사용료 부과·징수 : 부과액 21,771백만원, 징수액 21,228백만원(97.5%)

◦ 연도별 하수도사용료 현실화율 현황

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
사용료수익 (백만원)	19,763	24,635	25,690	22,993	21,770
㎥당 원가(원)	1,925.41	1,941.63	1,980.49	2,086.94	2,368.15
㎥당 요금(원)	556.50	695.78	737.22	680.38	743.16
현실화율(%)	28.89	35.83	37.22	32.60	31.38

◦ 원인자부담금 부과·징수 : 부과액 1,881백만원, 징수액 1,881백만원(100%)

◦ 여유자금 효율적 관리 : 예금액 16,397백만원(이자수입 106백만원)

2. 하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 부과징수 현황(2021년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	부과액 (B)	징수액 (C)	체납액 (D)	부과율 (B/A)	징수율 (C/B)
계	21,405	21,771	21,228	543	101.7	97.5
가정용	11,241	11,086	11,048	38	98.6	99.7
일반용	8,869	9,172	8,884	288	103.4	96.9
대중탕용	261	293	253	40	112.3	86.3
산업용	1,034	1,220	1,043	177	118	85.5

□ 연도별 체납액 현황

(단위 : 백만원, %)

년 도 금 액	합계	2021	과년도
			계	2020	2019	2018	2017 이전
계	925	543	382	250	143	127	112
가정용	74	38	36	31	5	1	30
일반용	427	288	139	54	34	33	72
대중탕용	68	40	28	45	8	11	9
산업용	356	177	179	120	96	82	1

□ 고액체납자(30만원 이상)행정조치 현황(지하수)

구분	체납액		행정조치				비고
			압류예고(독촉)중		압류
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	13	96	4	1	9	95
일반용	12	84	4	1	8	83
대중탕용	1	12	-	-	1	12

(단위 : 건, 백만원)

□ 추 진 실 적

◦ 징수대책반 편성 운영(2개조 7명)

▸체납자 유형별 분석(단순체납, 고질체납, 부도, 무재산 등)

▸전화·방문 체납 독려(징수) : 150건

- 소액(10만원 미만) : 전화 및 SMS(문자 메시지) 등 활용

- 고액(10만원 이상) : 체납자를 직접 방문하여 납부 독촉

◦ 고질체납자 징수 관리

▸대상 : 30만원 이상 또는 5회 이상 체납자

▸관리 : 체납액 납부 독촉(3회) 후 불이행 시 재산 압류 등 행정처분하고, 무재산 및 행방불명자는 결손처분 검토

3. 하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 채무상환 계획(시비 부담분)

(단위: 백만원)

사 업 명	임대료	상환액	상 환 계 획
			계	2022	2023	2024	2025이후
계	62,641	29,042	33,599	3,024	3,024	3,024	24,527
‘06 하수관거정비 BTL민간투자사업	29,589	16,323	13,266	1,417	1,417	1,417	9,014
‘09 하수관거정비 BTL민간투자사업	33,052	12,719	20,333	1,607	1,607	1,607	15,513

□ 채무 상환조건

재 원 별	용 도	상환조건	이율	상환기간	채권기관
‘06 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2011. ~ 2031.	(주)푸른익산환경
‘09 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2014. ~ 2034.	(주)청정익산

4. 하수찌꺼기 감량화사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수운영계장		신 현 섭	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내 (익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 년 ~  2022년

◦ 사 업 비 : 268억원(국비 70%, 도비 15%, 시비13%, 기금 2%)

◦ 사업내용

▸ 기존 소화조 개선(10,000㎥/일) 및 신설(6,692㎥/일)

▸ 가스저장설비, 가스정제설비, 기계식 농축기, 탈취설비 등 신설

□ 추 진 실 적

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 타당성 조사 용역 완료	: 2017. 02.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약	: 2017. 12.

◦ 설계 경제성(VE) 검토용역 완료	: 2018. 10.

◦ 설계의 기술자문, 재원협의, 설치변경인가 등 행정절차 이행	: 2018. 12. ~ 2019. 08.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019. 06.

◦ 시설공사(1차분) 착공	: 2019. 08.

◦ 시설공사(1차분) 준공	: 2020. 07.

◦ 시설공사(2차분) 착공	: 2020. 03.

◦ 시설공사(3차분) 착공	: 2021. 03.

▸ 전체 공정률 57%

5. 유천 생태습지 유지관리

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 규    모 : 생태습지관리 134,521㎡

▸ 잔디 및 풀 깎기(55,330㎡), 수목(교목 1,503주, 관목 44,200주), 정자 2개, 퍼걸러 8개, 바닥분수 1개, 음수대 1개, 어린이놀이시설 1개소, 야외공연장 1개소, 생태숲길 1개소, 수질 관리 등

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2021. 12.

◦ 사 업 비 : 130백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 유천생태습지 청소용역	: 2021. 01. ~ 12.

▸ 유천생태습지 정리 및 화장실 2개소 청소

◦ 유천생태습지 유지관리	: 2021. 01. ~ 12.

▸ 예초작업, 관목 전정작업, 해충방제 용역

◦ 주민편익시설 유지관리

▸ 화장실, 음수대, 야외공연장 시설물 수리, 목재데크 오일스테인 작업

6. 남부2·3, 북부2처리분구 하수관로정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남부2처리분구 (동산동 · 인화동 · 평화동 일부)

남부3처리분구 ( 금강동 · 신흥동 · 용제동  일부)

북부2처리분구 (영등1동 · 영등2동 · 신용동 일부)

◦ 규    모 : 오수관로 30.5km , 배수설비 2,616가구

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년간)

◦ 사 업 비 : 36,490백만원(국비 70%, 지방비 30%)

▸ 2021년 사업비 : 9,896백만원(국비 6,927 도비 297 시비 22,672)

□ 추 진 실 적

◦ 사업 선정	: 2016. 12. 23.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2017. 06. 19.

◦ 행정절차 이행 (재원협의, 기술심의, 원가검토)	: 2018. 04. ~ 12.

◦ 시설공사 시행(1차분)	완료	: 2019. 05. ~ 2021. 05.

◦ 시설공사 시행(2차분) 시행	: 2021. 03. ~ 2021. 03.

◦ 시설공사 시행(3차분) 시행	: 2021. 01. ~ 2021. 12.

▸ 공정률 : 66%

7. 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 규    모 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구 등

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)

◦ 사 업 비 : 18,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)

▸ 2021년 사업비 : 2,732백만원(국비 1,366 도비 136 기금 1,230)

□ 추 진 실 적

◦ 2019 국고보조사업 확정	: 2018. 12. 26.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2019. 07. 24.

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2021. 03. 24.

◦ 건설사업관리용역 착수(1차분)	: 2021. 07. 22.

◦ 시설공사 착공(1차분)	: 2021. 09. 29.

8. 북부1처리분구 하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 규    모 : 오수관로 L=35.6km, 배수설비 2,648가구

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

◦ 사 업 비 : 41,607백만원(국비 70%, 지방비 30%)

▸ 2021년 사업비 : 1,006백만원(국비 766 도비 33 기금 207)

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2020. 06

◦ 시설공사 발주 전 행정절차 이행

▸설계 경제성검토(VE) 용역 완료	: 2021. 08. 20.

▸설계 안전성검토 용역 완료	: 2021. 10. 11.

▸비굴착 보수공법 선정	: 2021. 10. 21.

▸기술자문위원회 심의 완료	: 2021. 12. 14.

9. 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 규    모 : 노후우수박스 정비 L=2.6km

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

◦ 사 업 비 : 12,110백만원(국비 6,055 도비 605 시비 5,450)

▸ 2021년 사업비 : 1,014백만원(국비 851 도비 85 시비 78)

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 03.

◦ 2021년 국고보조 신규 사업 신청(환경부)	: 2020. 02.

◦ 실시설계용역비 추경 확보(220백만원)	: 2020. 07.

◦ 2021년 국고보조 신규 사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

▸ 공정률 : 60%

◦ 실시설계용역 중지	: 2021. 06.

▸ 공법선정 및 재원협의 등 행정절차 추진

10. 국가산업단지 노후하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원(40만평)

◦ 규    모 : 노후 우·오수관로 정비 L=13.5km

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

◦ 사 업 비 : 13,555백만원(국비 6,394 도비 639시비 6,522)

▸ 2021년 사업비 : 1,993백만원(국비 996 도비 100 시비 824 기금 73)

▸ 행정절차 이행 등으로 사업비 전액 감액

□ 추 진 실 적

◦ 국고보조금 예산 신청(환경부)	: 2019. 02.

◦ 국가산업단지 노후하수관로 기술진단 시행	: 2019. 10.

◦ 실시설계용역 착수	: 2019. 10.

◦ 국고보조사업 확정	: 2019. 12.

◦ 국가산업단지 하수관로 정밀조사용역 시행	: 2020. 06.

◦ 설계경제성(VE) 검토용역 시행	: 2020. 09.

◦ 익산시 감사위원회 기술자문 완료	: 2020. 09.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2020. 10.

◦ 환경부 재원협의 보완	: 2021. 01. ~ 2022. 05.

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2022. 07.

11. 공공 하수처리시설 운영관리(BTO)

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수운영계장		신 현 섭	□

□ 시설운영현황

◦ 공공하수처리시설(BTO 사업)

▸ 운 영 사 : ㈜전북엔비텍

▸ 운영기간 : 2008. ~ 2028.

▸ 운 영 비 : 15,626백만원(2021년)

시 설 명	익산	익산북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량(㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
처리량(천㎥/년)	31,849	8,752	1,683	351	31

□ 추 진 실 적

◦ 하수처리장(4개소) 수질검사 실시(유입수 및 방류수 BOD 등 6개 항목)

▸ 매월 시료 채취 전라북도 보건환경연구원 수질분석 실시 : 12회

◦ 통합관리시스템을 활용한 적정수질 유지 및 시설물 상시 모니터링

◦ 해빙기 및 우기시 하수관로, 차집맨홀 및 시설물 수시 점검 실시

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 기준 준수(부지경계, 탈취기 배출구)

◦ 매년 안전관리계획 수립 후 안전보건교육 및 비상대비 훈련 실시

◦ 익산공공하수 3중계펌프장 탈취기 개선공사 완료          : 2021. 06. ~ 08.

◦ 익산북부공공하수 유입펌프 인버터 설치공사 완료         : 2021. 10. ~ 12.

◦ 익산공공하수 총인처리시설 여과기 여재 교체공사 완료    : 2021. 10. ~ 12.

12. 공공하‧폐수처리시설 관리대행

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수운영계장		신 현 섭	□

□ 시설운영현황

◦ 공공하 ‧ 폐수처리시설(민간위탁 관리대행)

▸ 운 영 사 : 환경시설관리(주), (유)대신환경개발

▸ 위탁기간 : 2021. 01. ~ 2022. 08.

▸ 운 영 비 : 2,940백만원(2021년)

시 설 명	하수처리시설			폐수처리시설
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량(㎥/일)	600	1,760	85개소	5,500	5,000	4개소

□ 추 진 실 적

◦ 하폐수처리장(25개소) 방류수 정기 수질검사 실시

수질검사주기	일 1회	주 1회	월 1회
검사대상	500톤/일 이상	50~500톤/일	50톤/일 미만
개소수	3개소	12개소	10개소

◦ 통합관리시스템을 활용한 적정수질 유지 및 시설물 상시 모니터링

◦ 해빙기 및 우기시 시설물 수시 점검 실시

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사

◦ 매년 안전관리계획 수립 후 안전보건교육 및 비상대비 훈련 실시

◦ 3산단 폐수처리장 악취기술진단 완료                     : 2021. 08. ~ 12.

◦ 오산 외 2개 하수처리장 기술진단 완료                   : 2021. 04. ~ 08.

13. 소규모 하수도 시설 정비 공사

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사업개요 및 추진사항

(단위 : 백만원, %)

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비	도급자	공정률
	계 : 56건			1,852
1	2021년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 15개소	2021. 1. ~ 2021. 4.	47	(주)주원건설	100
2	2021년 동절기 하수관련 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 13개소	2021. 1. ~ 2021. 3.	47	(유)은산	100
3	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 1차	하수도정비 6개소	2021. 2. ~ 2021. 3.	21	(주)부경건설	100
4	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 3차	하수도정비 8개소	2021. 1. ~ 2021. 3.	21	(유)남일건설	100
5	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 2차	하수도정비 6개소	2021. 2. ~ 2021. 4.	21	㈜브살렐건설	100
6	2021년 상반기 맨홀보수공사 단가계약	맨홀정비 51개소	2021. 2. ~ 2021. 5.	46	(유)세진건설	100
7	2021년 상반기 하수도 기계준설공사 단가계약 3차	준설토 124㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)주신테크	100
8	2021년 상반기 하수도 기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 110㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)엠제이이엔씨	100
9	2021년 상반기 하수도 기계준설공사 단가계약(4차)	준설토 115㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)보건	100
10	2021년 상반기 하수도 기계준설공사 단가계약(2차)	준설토 107㎥	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)한국티엠에스	100
11	2021년 주민생활 편익사업 단가계약 3차	하수도정비 11개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(주)유성산업	100
12	2021년 주민생활 편익사업 단가계약 2차	하수도정비 9개소	2021. 3. ~ 2021. 6.	44	(유)정진건설	100
13	2021년 주민생활 편익사업 단가계약 1차	하수도정비 16개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)성진건설	100
14	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 2차	하수도정비 14개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(주)건지토건	100
15	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 3차	하수도정비 13개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	㈜신토성건설	100
16	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 1차	하수도정비 10개소	2021. 3. ~ 2021. 7.	47	(유)익산환경건설	100
17	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약(4차)	하수도정비 7개소	2021. 3. ~ 2021. 6.	21	(유)도암건설	100
18	2021년 상반기 하수도 기계준설공사 단가계약(5차)	준설토 43㎥	2021. 4. ~ 2021. 8.	21	(유)우승건설	100
19	여산면 제남리 하수도 정비공사	하수관로 설치 L=229m	2021. 4. ~ 2021. 6.	27	(유)태우건설	100
21	2021년 주민참여예산 편성사업 단가계약(3차)	하수도정비 8개소	2021. 4. ~ 2021. 6.	20	㈜성원건설	100
22	2021년 주민참여예산 편성사업 단가계약(2차)	하수도정비 10개소	2021. 4. ~ 2021. 7.	21	(유)덕산건설	100
23	2021년 주민참여예산 편성사업 단가계약 1차	하수도정비 8개소	2021. 4. ~ 2021. 5.	21	(유)흙손건설	100
24	모현동 하수관로 정비공사	하수관로 설치 L=50m	2021. 4. ~ 2021. 6.	16	(유)동화개발	100
25	2021년 상반기 맨홀보수공사 단가계약(2차)	하수도정비 48개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	47	(합)신한건설	100
26	2021년 읍면동 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 6개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	21	(유)이레건설	100
27	2021년 상반기 하수도 정비공사 단가계약 5차	하수도정비 8개소	2021. 5. ~ 2021. 9.	21	(유)천수건설	100
28	2021년 읍면동 민원처리공사 단가계약 3차	하수도정비 4개소	2021. 5. ~ 2021. 7.	21	(주)유성산업	100
29	2021년 하수도 민원처리공사 단가계약 1차	하수도정비 5개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	41	선진산업	100
30	2021년 하수도 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 15개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	47	(유)한국티엠에스	100
31	2021년 읍면동 민원처리공사 단가계약 2차	하수도정비 3개소	2021. 5. ~ 2021. 8.	17	(유)원광수도사	100
32	낭산면 내돈마을 외 2개소 하수관로 정비공사	하수관로 설치 L=83m	2021. 4. ~ 2021. 5.	18	(유)우창건설	100
33	2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 1차	준설토 103㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	(유)주신테크	100
34	2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 3차	준설토 108㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	(유)주신테크	100
35	2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 2차	준설토 107㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	(유)엠제이이엔씨	100
36	2021년 우기철 대비 하수도기계준설공사 단가계약 5차	준설토 110㎥	2021. 6. ~ 2021. 9.	47	㈜신성토건	100
37	성당면 내난마을 하수관로 정비공사	하수관로 설치 L=86m	2021. 6. ~ 2021. 9.	15	㈜송민건설	100
38	2021년 하수관리 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비 7개소	2021. 7. ~ 2021. 10.	21	㈜에스제이 이엔씨	100
39	2021년 하수관리 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비 9개소	2021. 7. ~ 2021. 10.	21	(유)성진건설	100
40	2021년 하수관리 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도정비 5개소	2021. 7. ~ 2021. 10.	21	(유)광우건설	100
41	2021년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 46㎥	2021. 8. ~ 2021. 10.	21	㈜신성토건	100
42	2021년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약 4차	준설토 124㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	47	㈜신성토건	100
43	2021년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약 2차	준설토 112㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	47	㈜송민건설	100
44	2021년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약 3차	준설토 107㎥	2021. 9. ~ 2021. 12.	47	(유)광우건설	100
45	2021년 하수도 생활환경개선사업 단가계약(4차)	하수도정비 10개소	2021. 9. ~ 2021. 11.	21	㈜내담건설	100
46	2021년 하수도 생활환경개선사업 단가계약(3차)	하수도정비 7개소	2021. 9. ~ 2021. 10.	21	(유)엠제이엔씨	100
47	2021년 하수도 생활환경개선사업 단가계약 1차	하수도정비 13개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	40	㈜서경건설	100
48	2021년 하수도 생활환경개선사업 단가계약 2차	하수도정비 16개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	47	(유)한성건설	100
49	2021년 하반기 맨홀보수공사 단가계약	하수도정비 35개소	2021. 9. ~ 2022. 1.	38	(유)씨엘	100
50	2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도정비 6개소	2021. 10. ~ 2021. 12.	20	㈜성운건설	100
51	2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비 18개소	2021. 11. ~ 2022. 1.	47	㈜신성토건	100
53	2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(4차)	하수도정비 8개소	2021. 1. ~ 2022. 3.	21	(유)정진건설	100
54	2021년 하반기 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비 14개소	2021. 11. ~ 2022. 1.	47	(유)광우건설	100
55	2021년 동절기 하수도 기계준설공사 단가계약(1차)	준설토 75㎥	2021. 11. ~ 2022. 2.	34	㈜삼일공사	100
56	2021년 동절기 하수도 기계준설공사 단가계약(2차)	준설토 83㎥	2021. 11. ~ 2022. 2.	38	(유)대길환경	100

14. 지하수 이용부담금 부과․징수 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	지하수계장		김준기	□

□ 부과징수 현황

(단위: 백만원)

년 도	부 과		징 수		징수율(%)
	건수	금액(A)	건수	금액(B)	(B/A)
2021	4,416	259	4,103	236	91.1

□ 추 진 실 적

◦「익산시 지하수 관리 조례」제정 완료	: 2014. 4. 17.

◦ 지하수이용부담금 부과·징수	: 2016. 9. 15.

▸ 부과 제외 대상시설: 가정용, 농업용, 학교, 사회복지, 비상.간이 급수시설 등

▸ 이용부담금 부과면제: 부과금액이 월 2,000원 미만 (톤당 85원)

◦ 매월 지하수 사용량 검침 및 고지서 발송	: 2021. 1. ~ 12.

◦ 안전한 지하수 사용 홍보 및 체납분 납부 독려	: 2021. 1. ~ 12.

▸ 체납금 방문 및 전화 납부 촉구 징수 : 166건(징수액 9,292천원)