2022.  10. 31.

제247회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 주요성과
□	2022 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 ‘다이로움 water’ 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 스마트 미터 사업을 통한 유수율 제고 및 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	6	15	9	8	2
현 원	42	1	1	11	20	1	6	2
증 감				5	5	△8	△2

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원					임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민 단체	기관
10	2	1	2	4	1	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	274,525	272,914	99.4
도심권	218,838	218,619	99.9
읍면권	55,687	54,295	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	151,585
생 활 용 수	소 계	195,300	133,092	100%
	광 역	105,300	72,291	54.3%
	자 체	90,000	60,801	45.7%
공 업 용 수	자 체	35,000	18,493

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,311	3,350,060	100
가 정 용	48,485	1,659,278	49.5
일 반 용	14,910	554,403	16.5
대 중 탕 용	40	12,869	0.4
산 업 용	778	468,402	14.0
전용공업용	98	655,108	19.6

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,899.8	2.5	25.3	1,185.9	686.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2022 예산집행실적

【 2022. 9. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	관	항	세항	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				56,636,060	32,509,767	24,126,293	57.4
	사업비용			26,093,209	19,687,411	6,405,798	75.5
		영업비용		26,043,209	19,687,411	6,355,798	75.6
			원수 및 취수비	13,232,243	10,763,580	2,468,663	81.3
			정수비	2,489,935	1,873,219	616,716	75.2
			배·급수비	787,576	492,799	294,777	62.6
			급배수공사비	2,370,342	1,331,837	1,038,505	56.2	사고이월 6,282천원
			일반관리비	5,310,619	4,350,920	959,699	81.9
			징수 및 수용가관리비	1,852,494	875,056	977,438	47.2
		예 비 비		50,000	0	50,000	0
	자본적지출			30,542,851	12,822,356	17,720,495	42.0
		유형자산취득		15,341,201	4,444,310	10,896,891	29.0
			구축물	7,082,579	4,245,812	2,836,767	59.9	건설개량 696,483천원 사고이월 31,205천원
			기계장치	8,239,516	179,563	8,059,953	2.2	건설개량 7,983,878천원 ※원격검침단말기 구입 추진중
			공기구비품	19,106	18,935	171	99.1
		비가동설비자산취득		15,041,377	8,367,877	6,673,500	55.6
		기타자본적지출		10,169	10,169	0	100
			정부보조금반환	10,169	10,169	0	100
		예비비		150,104	0	150,104	0

2022 주요성과

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

▸노후상수도 정비사업 : 실시설계용역 추진(공정률 80%, 블록고립 확인 53개소)

▸스마트 지방상수도 지원사업 : 단계별 물품구입 및 시설공사 착공

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

▸상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 4개소 2.9km/614개소

▸관내 변류(제수변 및 소화전)정비 및 교체 : 119개소

◦ 상수도관망 전문기술진단을 통한 안정적인 물 공급 방안 마련

▸관내 송수 및 배수 시설물(L=1,494km) 현장조사 용역 추진

▸성능평가 및 간접평가 시행, 관망도 전산화 착수

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

▸‘22년 부과/징수 : 20,437백만원/20,160백만원(징수율 98.6%)

▸ 체납 징수반 편성·운영, 체납독려 및 단수조치, 징수 책임제 시행

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸급수구역 확장공사 : 4개소 2.85km / 급 ·배수관 개선공사 : 360개소 6.8km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸급수장치 수선 공사 1,960건, 수용가 옥내누수 탐사 738건

▸상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 40개소 8.0km

▸누수처 신고 포상금제 운영으로 신속 복구 : 40개소/395,000원

□ 반      성

◦ 스마트미터사업 추진 지연

▸검침단말기 구입 계약방법(2022년 중소기업자간 경쟁제품 지정에 따른 다수공급자 계약 운영지침), 단말기 형식(사례 선진지 견학) 검토

※ 지속적인 사후 유지관리가 필요한 만큼 면밀히 검토하여 현재 추진 중임

▸2022. 10. 검침단말기 설치공사(1차분) 착공 완료 및 2차분 계약 중이며 3차분 단말기 구입‧설치 의뢰(조달청) 11월 초까지 완료할 계획임

2022 주요업무 결산

		지방상수도현대화사업 <노후상수도정비, 스마트 관망관리 구축) 상수도관망 기술진단용역 금마배수지 확충공사 급수구역 확장 및 급·배수관 개선공사 스마트미터 사업 추진 상수도 요금 부과 징수 깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 관리 금강정수장 차염설비 설치공사 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사 업 비 : 58,376백만원

▸노후상수도 정비사업 : 55,733백만원(국비 50%, 도 10%, 시 40%)

- 2022년 사업비: 15,125백만원(2020년 8,360백만원, 2021년 12,080백만원)

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 2,643백만원(국비 70%, 시 30%)

◦ 사업내용

▸노후관교체(L=78.9km) 및 블록시스템구축(53개소)

▸정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 유량수압 감시 시스템 등

□ 추 진 실 적

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역 추진(공정률 80%)	: 2020. 01. ~

- 환경부 사전기술 검토 보고서 승인 신청(2022.08.05.)

▸블록시스템 구축공사 추진(공정율 26%)	: 2022. 08. ~ 12.

- 블록시스템 고립 확인을 위한 사전 구축공사 시행(61개소)

- 우선사업대상지(5개소) 블록구축공사 시행

: SH-03(남중동, 모현동), SH-06(영등동, 남중동), SH-07(남중동, 마동), SH-10(영등동), SH-11(마동)

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸시설공사 추진(공정율 67%)	: 2022. 01. ~

- 자동수질 측정장치(2개소), 정밀여과장치(3개소), 자동드레인(3개소), 관세척(2.5km)

□ 마무리 대책

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역 완료(환경부 사전기술 검토 승인) : 2022. 12.

▸블록시스템 구축공사 추진	: 2023. 01. ~ 2024. 12.

- (신흥 급수구역) 블록시스템 고립 및 운영 시행

- (익산시 전지역) 블록시스템 구축공사 공사 발주 및 착공

▸상수도관망 정비공사(노후관 교체) 추진	: 2023. 01. ~ 2024. 12.

- 신흥 급수구역 내 노후관 교체(L=78.9km, 사업비 250억원)

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸시설공사 준공(자동수질 측정장치, 정밀여과장치, 자동드레인, 관세척)	: 2022. 12.

2		상수도관망 기술진단용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.

◦ 용 역 비 : 200백만원

◦ 용역내용 : 상수도관 L=1,494km 기술진단 1식

▸용역업체 : (주)정엔지니어링 / 193백만원

◦ 관계법령

▸수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등), 동법 시행규칙 제27조(수도시설에 대한 기술진단의 구분)에 의한 법적 의무사항(5년마다 시행)

- 최근 용역 완료 : 2016. 11. 15.(용역비 1,085백만원)

※현재 진행중인『지방상수도 현대화사업』현장조사 자료를 활용하여     용역비 절감

□ 추 진 실 적

◦ 상수도관망 기술진단용역 추진(공정률 70%)

▸용역 발주 및 착수	: 2022. 02. ~ 03.

- 관내 송수관 및 배수관 시설물(L=1,494km) 자료 조사

- 지리정보 시스템 수도시설물 현황 검토 등

- 공정 보고(매월)

▸송‧배수관 상태 및 성능평가 실시	: 2022. 07. ~ 10.

- 송‧배수관로 블록별 관로 분할 및 성능평가, 간접평가 실시

- 관망도 전산 자료 작성

□ 마무리 대책

◦ 상수도관망 기술진단용역 준공

▸보고서 환경부 협의 및 승인	: 2022. 11. ~ 12.

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 산 33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 2024. 12.(4개년)

◦ 사 업 비 : 8,010백만원(균특 5,600백만원, 시비 2,410백만원)

▸2022년 사업비 : 1,086백만원(도비 760, 시비 326백만원)

◦ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	‘21	‘22	‘23	‘24
계	8,010	714	1,086	3,000	3,210
균특이양	5,607	500	760	2,100	2,247
시 비	2,403	214	326	900	963.

◦ 사업내용 : 금마배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

◦ 기대효과 : 북부권 용수 수요 증가에 따른 배수지 체류시간 확보 및 생활용수의 안정 공급

□ 추 진 실 적

◦ 실시계획인가 및 설계심의 완료	: 2022. 02.

◦ 원가심사(전북도)	: 2022. 04.

◦ 1차분(토목,건축,기계) 조달 발주	: 2022. 05. 20.

◦ 업체선정(입찰 완료)	: 2022. 10. 05.

▸계약업체 : 부일건설(주) / 3,320백만원

□ 마무리 대책

◦ 1차분(토목,건축,기계) 공사 계약 및 착공	: 2022. 10. 20.

◦ 1차분(토목,건축,기계) 준공	: 2023. 6.

◦ 2차분(토목,건축,기계) 및 전기 착공	: 2023. 01.~12.

◦ 금마배수지 확충공사 준공	: 2024. 12.

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ∼ 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업(계획)량	사업비 (백만원)	비고
합 계			2,220
급수구역 확장공사	함라면 신대마을 외 4개소	배수관부설 L=2,850m	670
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	40개소, 8km	600
급·배수관 개선공사	익산시 일원	475개소, 9km	950

□ 추 진 실 적

◦ 함라면 신대마을외 4개소 배수관부설D75~D150mm(L=2.85km) 준공	: 2022. 2. ~  7.

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 40개소(L=8.0km) 준공	: 2022. 8.

◦ 급·배수관 개선공사 360개소(L=6.8km) 준공	: 2022. 9.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

□ 마무리 대책

◦ 급․배수관 개선공사 115개소(2.2km) 추진	: 2022. 10. ~ 12.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

5		스마트미터 사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

◦ 총사업비 : 12,100백만원(국 8,470, 시 3,630) ※ 검침단말기 구입설치 : 5,790백만원

◦ 사 업 량 : 38,600전(13~25mm 소구경)

◦ 사업내용

▸디지털 수도미터구입 및 설치공사, 원격검침단말기 설치, 통신망 관리  서버 및 소프트웨어 구축 등

□ 추 진 실 적

◦ 디지털 수도미터구입 및 설치공사, 프로그램 구축	: 2021. 4. ~ 11.

◦ 무선원격검침 시스템 설치운영 중인 지자체 선진지견학	: 2022. 5.

▸부산광역시, 광주광역시, 고창군, 무주군

◦ 검침단말기 구입설치 추진계획 수립	: 2022. 9.

◦ 검침단말기 구입설치 제안공고·업체선정·계약(1차분)	: 2022. 9.

◦ 검침단말기 구입설치 제안공고(2차분)	: 2022. 10.

□ 마무리 대책

◦ 검침단말기 구입설치 업체선정·계약추진(2차분)            : 2022. 10.

◦ 검침단말기 설치공사(1차분)                            : 2022. 10. ~ 2023. 1.

◦ 검침단말기 구입설치 제안공고(3차분)                   : 2022. 10.

◦ 검침단말기 설치공사(2차분)                            : 2022. 11. ~ 2023. 2.

◦ 검침단말기 구입설치 업체선정·계약추진(3차분)            : 2022. 11.

◦ 검침단말기 설치공사(3차분)                            : 2022. 12. ~ 2023. 3.

6		상수도요금 부과·징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.(매월 부과)

◦ 2022년도 요금 부과·징수 실적

(‘22. 10. 1.현재/9월 부과분 기준/단위:백만원, %)

구분	‘22년도 목표액	현년도		과년도		비고
		부과액	징수액 (징수율)	체납액	징수액 (징수율)
금액	27,044	20,437	20,160 (98.6%)	979	241 (24.6%)

□ 추 진 실 적

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육 : 8회

※ 코로나19로 인한 검침원 조별편성 교육실시

▸계량기 조사원 담당구역 징수 책임제 시행 : 2회이상 체납자 독려, 단수예고문 부착

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수추진반 편성․운영 : 2개반 11명

▸전화, 문자, 방문 체납독려 및 단수조치 : 납부독려 11,785건/단수 120건

▸30만원, 3회 이상 고액 체납자 압류예고문 발송 및 압류 : 예고문발송930건/압류28건

▸2회이상 체납자 단수예고문 발송 : 19,371건

▸상수도사용료 체납자 독려 결과보고(월2회)

▸소멸시효경과에 따른 상수도요금 과년도(2018년이전) 체납액 결손처분 : 2,420건/17백만원

◦ 수도요금 고지 관리

▸요금고지 : 월 59,809건 (우편발송 2,006건/ 조사원 전달 56,283건 /스마트고지 1,520) ※ 자동납부 28,099건

□ 마무리 대책

◦ 징수율 제고를 위한 체납징수 활동 강화로 체납액 이월 최소화

▸상습체납자 집중 징수기간 운영 및 행정조치 : 단수, 토지 및 건물 등 재산압류

※  기초생활수급자 등 사회적 약자 단수유예로 시민불편 최소화

7		깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업대상 : 11개소(정수장2, 배수지7, 가압장2)

◦ 사업내용

▸정수시설물(침전지, 배수지) 청소로 정수처리 효율증가 및 맑은 물 공급

▸노후시설물의 보수 및 교체공사로 안정적인 정수 생산

□ 추 진 실 적

◦ 정수시설물 전기설비 유지보수 완료

▸금마가압장 CCTV 교체공사	: 2022. 3. 22.

▸신흥정수장 수전설비 VCB 교체공사	: 2022. 4. 29.

▸신흥정수장 공업용수 변압기 설치공사	: 2022. 5. 16.

◦ 정수시설물 기계설비 유지보수 완료

▸금마가압장 및 공업용수 송수펌프 보수공사	: 2022. 3. 30.

▸신흥정수장 침전지 슬러지 배출펌프 설치공사	: 2022. 6. ~ 9.

▸금강정수장 응집기 및 밸브 교체공사	: 2022. 7. ~ 8.

▸정수장 여과지 이중문‧에어커튼 설치 및 조작대 보강공사	: 2022. 9. ~ 10.

◦ 정수시설물 정밀점검 용역 완료	: 2022. 3. ~ 8.

▸신흥 및 금강정수장, 신흥보조수원지 및 왕궁배수지

◦ 배수지 청소 1회, 침전지 청소 3회, 풀깎기 3회 완료	: 2022. 3. ~ 10.

□ 마무리 대책

◦ 정수장 여과지 표면세척 설비 보수공사	: 2022. 10. ~ 11.

◦ 신흥정수장 여과지 정수밸브 교체공사	: 2022. 10. ~ 11.

◦ 침전지 청소(4차) 및 배수지 청소(하반기)	: 2022. 11. ~ 12.

8		금강정수장 차염설비 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강정수장 염소소독동

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 538백만원

◦ 사업대상 : 금강정수장 소독설비

◦ 사업내용

▸차염설비 1식, 건축동 1동 설치

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 완료	: 2022. 5.

◦ 차염설비 설치공사 발주	: 2022. 5.

◦ 개찰·적격심사 및 업체 선정	: 2022. 6.

▸ 계약업체 : 바다정수산업주식회사 / 386백만원

◦ 차염설비 설치공사(제작, 설치 등) 착공	: 2022. 7.

◦ 차염설비 건축공사 발주 및 업체 선정	: 2022. 9.

▸ 계약업체 : (유)남양건설 / 41백만원

◦ 차염설비 건축공사(조립식 판넬 구조) 착공	: 2022. 10.

□ 마무리 대책

◦ 차염설비 설치완료 및 시범운영	: 2022. 11.

◦ 준공 및 정상운영	: 2022. 12.

9		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 확보를 위한 주민 홍보 강화

□ 추 진 실 적

◦ 원․정수 수질 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정 수질검사 기준	자체 수질검사 계획
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 8개 분 기 : 질산성질소 등 31개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 월 간 : 수소이온농도 등 9개 분 기 : 질산성질소 등 31개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시 : 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부(50,000부)	: 2022. 5.

◦ 수질검사결과 홍보강화 : 공공기관, 홈페이지(매월) 및 내고장소식지 등 게재

◦ 수돗물 평가위원회 개최	: 2022. 5. 20.

◦ 수돗물 안심확인제 운영에 따른 수질검사 실시	: 118건

□ 마무리 대책

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보

◦ 원‧정수에 대한 철저한 수질관리로 시민이 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급