2022.  10. 31.

제247회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 주요성과
□	2022 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	6	6	6	5
현 원	24	1	8	7	3	5
증 감			2	1	△3

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수찌꺼기 감량화 사업 추진, 공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2021. 12.	비 고
시설	총인구	천명	282
	하수인구	천명	270
	보급률	%	95.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	122,122
	1일평균하수처리량	톤	118,400
	하수처리율	%	96.95
하수도 사용	개소수	전	40,823
	톤당 평균요금	원	743.16

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	준공일자	비 고
계	30	150,110㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	1995.07	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	2004.09	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	2008.06	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	2008.06	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	2009.12	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	2010.05	민간위탁 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	22	1,760㎥/일	1995~2017	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	2014.07	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	2019.12	〃

2022 예산집행실적

【 2022. 9. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	관	항	세항	예산액(A)	집행액(B)	잔 액	비 율 (B/A)	비고
하수도과				84,613,840	51,839,172	32,774,668	61.3
	사업비용			36,965,544	34,967,878	1,997,666	94.6
		영업비용		36,768,544	34,967,878	1,800,666	95.1
			관거비	14,961,262	14,034,414	926,848	93.8
			처리장비	19,020,738	18,982,533	38,205	99.8
			일반관리비	2,786,544	1,950,931	835,613	70.0
		예비비		197,000	0	197,000	0
	자본적지출			47,648,296	16,871,294	30,777,002	35.4
		유형자산취득		46,742,896	16,266,039	30,476,857	34.8
			구축물	46,574,896	16,105,947	30,468,949	34.6
			건설중인자산	168,000	160,092	7,908	95.3
		비가동설비자산취득		615,000	600,000	15,000	97.6
			건설중인자산	615,000	600,000	15,000	97.6
		기타자본적지출		5,400	5,255	145	97.3
			정부보조금반환	5,400	5,255	145	97.3
		예비비		285,000	0	285,000	0

2022 주요성과

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율 개선

‣남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 완료(공정률 100%)

- 관로정비 29.6km, 배수설비 2,288개소

‣남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 추진(공정률 9.3%)

- 관로정비 1.9km, 배수설비 584개소

‣북부1처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 추진(공정률 90%)

- 재원협의 신청(2022.02.10.) / 완료(2022.06.23.)

- 도로관리심의회 심의 완료

‣황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 추진(착공 2022.04.26.)

- 오수신설 0.57km, 배수설비 33개소, 맨홀펌프장 1개소

‣하수시설 민원처리 배수설비 공사 30건 처리 완료

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣소규모공공하수처리시설(삼기간촌 외 4개소) 기술진단 실시

‣환경기초시설 악취개선사업 실시설계용역시행을 통한 악취 저감 추진

‣수질측정기기 TOC교체 등 기능보강공사 추진으로 방류수질 관리철저

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣소규모 공사 115건 처리 및 생활민원처리 209건 처리

‣생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 1,879건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역 추진 중(공법선정 및 재원협의 등 행정절차 지연)

2022 주요업무결산

		남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 금마공공하수처리시설 증설 하수찌꺼기 감량화 사업 환경기초시설 악취개선 사업 공공하수처리시설 운영관리(BTO) 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 영등지구 노후하수관로 정비사업 송학동 우수박스 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

1		남부2⦁3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동, 주현동, 동산동 / 신흥동, 영등1동, 신용동

◦ 사업기간 : 2019. 05. ~ 2022. 09.

◦ 사업내용 : 오수관로 정비 L=29.6km, 배수설비 2,288가구

◦ 총사업비 : 35,120백만원(국비  24,043 도비  1,029 시비 10,048)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019이전	2020	2021	2022	비고
합계(100%)	35,120	14,843	1,447	10,869	7,961
국비( 70%)	24,043	9,830	1,013	7,627	5,573
도비( 3%)	1,029	420	43	327	239
시비( 27%)	10,048	4,593	391	2,915	2,149

□ 추 진 실 적

◦ 공정률 : 100% (관로 29.6㎞, 배수설비 2,288개소)

◦ 4차분 공사 착수	: 2022. 01.

▸오수관로 L=1,572m, 압송관로 749m, 맨홀펌프장 설치 4개소, 개인

배수설비 설치 497개소

◦ 전체분 및 4차분 공사 준공	: 2022. 09. 14.

□ 마무리 대책

◦ 시운전 및 시설물 인계ㆍ인수	: 2022. 12.

▸오수관로 29.6㎞, 맨홀펌프장 15개소, 맨홀 695개(오수 621, 소형 74)

2		남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구, 맨홀펌프장 9개소, 자가펌프장 11개소

◦ 총사업비 : 37,386백만원(국비  13,559 도비 2,382 시비  21,445)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020이전	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	37,386	1,321	2,604	9,310	5,407	18,744
국비( 36%)	13,559	642	1,366	4,655	1,961	4,935
도비( 6%)	2,382	64	136	465	345	1,372
시비( 58%)	21,445	615	1,102	4,190	3,101	12,437

□ 추 진 실 적

◦ 공정률 : 9.3% (관로 1.9㎞, 배수설비 584개소)

◦ 1차분 공사 추진	: 2022. 02.

▸오수관로 L=444m, 굴착교체 L=297m, 개인배수설비 설치 366개소

◦ 2차분 공사 착공	: 2022. 07.

▸오수관로 L=308m, 굴착교체 L=890m, 개인배수설비 설치 218개소

□ 마무리 대책

◦ 1차분 공사 준공	: 2022. 11.

▸오수관로 L=444m, 굴착교체 L=297m, 개인배수설비 설치 366개소

3		북부1처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=28.4km, 배수설비 1,363가구

◦ 총사업비 : 44,242백만원 (국비 24,851 도비 1,939 시비 17,452)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	44,242	714	1,153	2,016	3,576	36,783
국비( 56%)	24,851	500	1,010	1,411	2,503	19,427
도비( 4%)	1,939	21	43	60	107	1,708
시비( 40%)	17,452	193	100	545	966	15,648

□ 추 진 실 적

◦ 재원협의 완료	: 2022. 06.

◦ 도로관리심의회 심의 완료	: 2022. 09.

◦ 공사 발주 관련 관계도서 준비	: 2022. 06. ~ 10.

□ 마무리 대책

◦ 1차분 건설사업관리용역 발주 및 착수	: 2022. 10.

◦ 1차분 공사 발주 및 착공	: 2022. 11.

4		금마공공하수처리시설 증설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 동고도리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 하수처리시설 증설 Q=1,100㎥ ⇒ 1,600㎥

◦ 총사업비 : 7,160백만원 (국비 5,012 도비 1,074 시비 1,074)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	비고
합계(100%)	7,160	270	429	185	6,276
국비( 70%)	5,012	-	300	129	4,583
도비( 3%)	1,074	-	65	28	981
시비( 27%)	1,074	270	64	28	712

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 추진(공정률 20.1%)	: 2022. 07. ~ 12.

▸익산시하수도정비기본계획(변경)에 의한 금마처리구역 정비 및 연계처리 사업 반영 검토

□ 마무리 대책

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2023. 01. ~ 03.

◦ 공사 발주 전 행정절차(재원협의 등) 추진	: 2023. 03. ~ 06.

◦ 공사 발주 및 착공	: 2023. 07.

5		하수찌꺼기 감량화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내(익산시 하나로 68일원)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사업내용

▸소화조개선 4기(10,000㎥) 및 신설2기(6,692㎥) : 가온방식변경, 교반기 신설

▸탈취시설, 가스저장조 및 탈황설비 노후로 인한 교체

▸협잡물처리기, 농축시설 및 저류조 운영방식 개선, 반류수 처리시설(1,790㎥) 신설

◦ 총사업비 : 26,844백만원(국비 18,791 도비 4,027 시비 3,285 기금 741)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022	비고
합계(100%)	26,844	3,688	13,293	9,563	300
국비( 70%)	18,791	2,372	9,305	7,114	0
도비( 15%)	4,027	509	1,994	1,524	0
시비( 15%)	4,026	807	1,994	925	300

□ 추 진 실 적

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 시설, 전기, 소방, 통신공사 시행(공정률 93%)

▸슬러지처리동, 신설 소화조(2기) 건축구조물 설치

▸관급자재(탈황시설, 제습시설, 펌프류, 공법사자재 등) 납품 및 설치

▸수배전반, 전열, 전등 및 소방, 정보통신설비 설치

□ 마무리 대책

◦ 시설공사, 전기계측, 소방, 정보통신공사 준공	: 2022. 11.

◦ 시운전 시행	: 2022. 11.

6		환경기초시설 악취개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 총 8개소(익산·분뇨·북부·함열·금마·여산하수,1·2중계펌프장)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 악취방지시설 신규 설치 및 용량 재구성 등

◦ 총사업비 : 7,995백만원(국비 4,320 도비 1,838 시비 1,837)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	7,995	667	3,032	4,296
국비( 54%)	4,320	500	1,528	2,292
도비( 23%)	1,838	167	669	1,002
시비( 23%)	1,837	0	835	1,002

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 조달청 발주 의뢰	: 2022. 03.

◦ 실시설계 용역 착수	: 2022. 06.

▸용역기간 : 2022. 6. 16. ~ 12. 12.

▸도 급 액 : 310,700천원

◦ 실시설계 용역 착수	보고	: 2022. 07.

□ 마무리 대책

◦ 행정절차 이행(재원협의 등)	: 2022. 11.

◦ 실시설계용역 준공	: 2022. 12.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2023. 01. ~ 2024. 12.

7		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소, 중계펌프장 17개소

시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량(㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

※ 2022년 BTO위탁운영비 : 15,860백만원(도비 590 시비 15,270)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개 항목)

▸방류수수질기준 1회/일 검사(BOD, TOC, T-N, T-P, 총대장균수)

◦ 함열하수 공기압축기 보수 외 19건 보수 및 개선 실시	: 2022. 01. ~ 09.

◦ 공공하수처리시설(BTO) 안전점검 실시	: 2022. 01. ~ 06.

▸익산 외 3개 공공하수처리시설 설연휴 대비, 해빙기, 우기철 안전점검 완료

◦ 공공하수처리시설 4개소 수질TMS TOC측정기기 교체	: 2022. 06.

◦ 공공하수도 운영관리 실태평가 현지평가 완료(환경청)	: 2022. 07.

◦ 공공하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 기준 준수(부지경계, 탈취기 배출구)

▸익산공공하수 등 4개 처리시설 1, 2, 3분기 완료

◦ 익산북부공공하수 대수선 시행	: 2022. 10.

▸생물반응조 송풍기 4대 교체

□ 마무리 대책

◦ 공공하수처리시설 방류수수질기준 준수 및 수질검사 : 매월

◦ 동절기 공공하수처리시설(BTO) 안전점검 실시	: 2022. 11.

▸익산공공하수 등 4개 처리시설 동절기 대비 점검 실시

◦ 공공하수처리시설 복합악취농도 검사 4분기 실시	: 2022. 11.

8		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 25개소(여산 1, 소규모 22, 제3산업단지 1, 국가식품클러스터 1)

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량(㎥/일)	600	1,760	85개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), (유)대신환경개발 2020.~2022.]

※ 2022년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비: 3,021백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리

▸공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 점검 및 관리(주 4~5회 수시점검)

▸23개 처리시설 용량별 방류수 수질검사 실시

- 500톤/일 이상 3개소 일 1회, 50~500톤/일 12개소 주 1회, 50톤/일          미만 10개소 월 1회 수질검사

◦ 삼기간촌 외 4개 하수처리시설 기술진단 착수	: 2022. 02.

◦ 3산단 폐수처리장 TMS용 TOC측정기기 교체	: 2022. 06.

◦ 삼기간촌 외 4개 하수처리시설 기술진단 완료	: 2022. 07.

◦ 공공폐수처리시설 운영‧관리 실태평가(환경부)	: 2022. 08.

◦ 3산단 악취개선공사 외 12개 보수공사 실시	: 2022. 01. ~ 09.

□ 마무리 대책

◦ 동절기 대비 하폐수처리시설 안전점검 실시	: 2022. 11.

◦ 여산기술진단 개선사항 외 5개 보수공사 완료	: 2022. 12.

9		익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.63km

※ 평화동(1,250m), 송학동(910m), 모현동(470m)

◦ 총사업비 : 12,109백만원(국비 6,055 도비 605 시비 5,449)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021	2022	2023 이후	비고
합계(100%)	12,109	1,000	1,241	9,861
국비( 50%)	6,055	500	1,041	4,514
도비( 5%)	605	50	104	451
시비( 45%)	5,449	450	96	4,896

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 03.

◦ 2021년 국고보조사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

◦ 설계경제성(VE) 검토 용역 시행	: 2020. 11.

◦ 실시설계용역 중지	: 2021. 06.

▸공법선정 및 재원협의 등 행정절차 추진

□ 마무리 대책

◦ 사업추진 공법 결정(비굴착 전체보수, 부분보수 등)	: 2022. 10.

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2022. 11.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2022. 11. ~ 2024. 12.

10		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 13,555백만원(국비 6,394 도비 639 시비 6,522)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2019 이전	2020	2021	2022	2023 이후	비고
합계(100%)	13,555	186	1,000	4	1,215	9,158
국비( 50%)	6,394	0	500	0	851	5,043
도비( 5%)	639	0	50	0	85	504
시비( 45%)	6,522	186	450	4	279	5,603

□ 추 진 실 적

◦ 환경부(전북지방환경청) 재원협의 보완	: 2022. 05.

◦ 환경관리공단 기술검토 의뢰	: 2022. 06.

◦ 환경관리공단 기술검토 의견회신	: 2022. 06.

◦ 환경부(전북지방환경청) 재원협의 완료	: 2022. 07.

◦ 전라북도 원가심사 완료	: 2022. 08.

◦ 건설사업관리용역 업체 선정	: 2022. 10.

□ 마무리 대책

◦ 공사 착수 및 완료	: 2022. 11. ~ 2024. 12.

11		영등지구 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동, 마동, 남중동 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 노후하수관로정비 L=7.2km

※ 영등동(5,854m), 마동(1,060m), 남중동(286m)

◦ 총사업비 : 11,000백만원(국비 5,500 도비 550 시비 4,950)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022	2023 이후	비고
합계(100%)	11,000	550	10,450
국비( 50%)	5,500	500	5,000
도비( 5%)	550	50	500
시비( 45%)	4,950	0	4,950

□ 추 진 실 적

◦ 2022년 환경부 신규 국고보조사업 확정	: 2021. 10.

◦ 실시설계용역 조달 발주 의뢰	: 2022. 04.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 05.

□ 마무리 대책

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2022. 11.

◦ 공사 착수	: 2023. 03.

12		송학동 우수박스 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-7번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 2.0m × 1.5m 우수박스 설치(L=380m)

※ 기존 시설물 현황 : 1.5m × 1.0m ~ 1.5m × 1.2m

◦ 총사업비 : 1,000백만원(특교세 1,000)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 계약 및 착수	: 2022. 01.

◦ 실시설계용역 준공	: 2022. 08.

◦ 국가철도공단(폐철도 배수시설물 사용) 협의 추진	: 2022. 09.

□ 마무리 대책

◦ 공사 발주	: 2022. 12.

◦ 공사 준공	: 2023. 12.

13		소규모 하수도 시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 총사업비 : 1,991백만원 (시비)

◦ 사업내용

▸소규모 하수도시설 정비공사	:  800백만원

▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	:  191백만원

- 함열읍 동지하마을 하수도 정비공사 외 25건

▸하수관로 기계준설	: 1,000백만원

□ 추 진 실 적

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸하수도 단가공사 발주 25건(700백만원)	: 2022. 01. ~ 2022. 09.

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)

▸상반기 공사 완료 26건(191백만원)	: 2022. 01. ~ 2022. 09.

◦ 하수관로 기계준설

▸기계준설 공사 발주 17건(687백만원)	: 2022. 01. ~ 2022. 09.

□ 마무리 대책

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸하반기 공사 발주 3건(100백만원)	: 2022. 10. ~ 2022. 12.

◦ 하수관로 기계준설

▸하반기 공사 발주 8건(313백만원)	: 2022. 10. ~ 2022. 12.