2022. 10. 31.

제247회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 결산보고

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 주요성과
□	2022 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공
◦	장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모
◦	조명시설 설치로 보행환경개선 및 야간통행 불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			하천시설					하천관리				가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	4	9	4	4
현 원	23 (정원외 1)		1	6	8 (정원외 1)	3	5
증 감	1		-	2	△1	△1	1

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업 추진, 철도건널목 개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등, 사업관련 협의
	◦	하천시설	:	하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리	:	하천유지관리(국가,지방,소하천),용안생태습지유지관리 하천사용료 징수 부과, 골재채취허가
	◦	가로등관리	:	가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비 대상	개수 연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	155.797	167.836	48%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	29.187	73.016	29%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
923	430	-	493	2,986,639	232,614	-	2,754,025

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
30,434	19,622	10,812

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 2대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2022 예산집행실적

【 2022. 9. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				44,950,190	19,468,702	25,481,488	43.3
	도로시설관리			17,423,149	8,298,285	9,124,864	47.6
		시군농어촌도로확포장		9,395,963	4,892,603	4,503,360	52.1
			금마 갈산-서편간 도로확포장공사	942,594	295,250	647,344	31.3	명시 42,594
			삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	500,000	103,259	396,741	20.7
			미불용지매입비(시군도농어촌도로)	648,000	511,923	136,077	79.0
			춘포 토다리-덕동간 도로확포장공사	790,000	766,425	23,575	97.0
			금마 누동~신촌간 도로확포장	400,000	371,850	28,150	93.0
			군도 23호선 도로 확포장공사	191,360	150,914	40,446	78.9	명시 191,360
			시군도 도로관리계획및 농어촌도로 기본계획 용역	77,913	0	77,913	0	명시 77,913
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	910,258	87,411	822,847	9.6	명시 460,258
			오산면 소재지 진입도로 확포장공사	1,107,142	933,845	173,297	84.3	사고 107,142
			황등 도선-외화간 도로 확포장공사	400,000	170,423	229,577	42.6
			오산역-상아마을간 병목구간 도로확포장공사	50,000	49,672	328	99.3
			하나로~소간촌간 도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0
			왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사	482,641	466,850	15,791	96.7	명시 52,641
			춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0
			금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	300,000	6,659	293,341	2.2
			춘포 오룡선 도로확포장	300,000	84,935	215,065	28.3
			황등면 하동마을~동연지하차도 도로 개설공사	200,000	102,078	97,922	51.0
			춘포 노적선 도로확포장공사	550,828	400,182	150,646	72.7	명시 500,000 사고 50,828
			시군농어촌도로 확포장사업 추진	8,000	6,650	1,350	83.1
			시도31호 도로확포장 사업	6,191	0	6,191	0	사고 6,191
			백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	451,636	283,546	168,090	62.8	명시 451,636
			망성 신하선 도로확포장공사	100,000	34,000	66,000	34.0
			오산 용연선(모현동장례식장~용곤마을)도로확포장 사업	100,000	0	100,000	0	명시 100,000
			함라 행진선 도로확포장	449,400	66,731	382,669	14.8	명시 49,400
			삼기 만대선(하나로~검지마을) 도로확포장공사	80,000	0	80,000	0
			금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	0	150,000	0
		지방도 도로확포장		1,115,446	716,414	399,032	64.2
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,115,446	716,414	399,032	64.2	명시 100,446
		철도건널목 개량사업		899,537	695,508	204,029	77.3
			황등지구 철도건널목 입체화사업	540,000	539,241	759	99.9
			평화육교재가설	359,537	156,267	203,270	43.5	명시 359,537
		주민숙원사업		36,280	32,980	3,300	90.9
			주민숙원사업	36,280	32,980	3,300	90.9
		교통관리개선사업		1,562,407	92,750	1,469,657	5.9
			용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	20,000	0	20,000	0
			성당 삼회선 도로구조개선사업	300,000	18,275	281,725	6.1	명시 300,000
			왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	358,043	26,384	331,659	7.4	사고 358,043
			낭산~시명 선형개량사업	884,364	48,091	836,273	5.4	명시 884,364
		도로조명시설관리		3,413,516	1,863,410	1,550,106	54.6
			보안등 신규 설치	298,988	147,262	151,726	49.3	사고 24,988
			노후 가로등 정비	1,482,000	468,674	1,013,326	31.6
			가로등 · 보안등 유지관리	1,614,760	1,229,706	385,054	76.2
			가로등 보수차량 운영유지비	17,768	17,768	0	100
		국도 도로확포장		1,000,000	4,620	995,380	0.5
			국도27호 대체우회도로(서수~평장2)건설공사	1,000,000	4,620	995,380	0.5
	하천정비			27,397,320	11,079,067	16,318,253	40.4
		하천 정비 및 유지관리		27,397,320	11,079,067	16,318,253	40.4
			지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	14,463,020	7,074,525	7,388,495	48.9	계속비 6,463,020
			지방하천정비(동면천)(전환사업)	5,070,119	936,996	4,133,123	18.5	계속비 2,070,119
			소하천정비(진사천)(전환사업)	1,449,872	72,769	1,377,103	5.0	명시 149,872
			소하천정비(황각천)(전환사업)	200,000	54,943	145,057	27.5
			하천제방 유지보수(자체)	3,380,762	1,932,774	1,447,988	57.2	명시 134,940
			하천제방 유지보수	902,203	448,169	454,034	49.7	명시 2,203
			국가하천유지보수(4대강)	392,000	283,839	108,161	72.4
			국가하천유지보수(4대강외)	228,000	147,140	80,860	64.5
			미불용지매입비(소하천)	25,000	8,716	16,284	34.9
			만경강 문화관	186,344	119,196	67,148	64.0
			국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	900,000	0	900,000	0
			하천구역 출입 자동차단시설 설치사업	100,000	0	100,000	0
			탑천 준설 및 제방 법면정비사업	100,000	0	100,000	0
	재무활동(건설과)			6,100	4,474	1,626	73.3
		보전지출		6,100	4,474	1,626	73.3
			시도비 보조금 반환금	6,100	4,474	1,626	73.3
	행정운영경비(건설과)			123,621	86,876	36,745	70.3
		인력운영비		89,759	54,123	35,636	60.3
			국가하천유지보수(인력운영비)	48,000	25,592	22,408	53.3
			만경강 문화관(인력운영비)	41,759	28,531	13,228	68.3
		기본경비		33,862	32,753	1,109	96.7
			기본경비	33,862	32,753	1,109	96.7

2022 주요성과

□ 성      과

◦ 시군도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민편익 증대

▸오산역 ~ 상아마을간 도로확포장공사(L=0.2km,B=8.0m) 준공	: 2022.  4.

▸춘포 토다리 ~ 덕동간 도로확포장공사(L=1.0km,B=8.0m) 준공	: 2022.  6.

▸왕궁 양동마을 진입도로확포장공사(L=0.6km,B=8.0m) 준공	: 2022.  6.

▸금마 누동-신촌간 도로확포장공사(L=1.0km,B=8.0m) 준공	: 2022.  8.

◦ 토지수용재결 추진 및 완료로 공익사업 추진 탄력

▸제4일반산업단지~하나로간 지방도 확포장공사 수용재결 완료	: 2022.  8.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장공사 수용재결 추진	: 2022.  9.

◦ 지방하천 정비사업을 통한 재해예방 및 친수공간 조성

▸왕궁천 하천정비공사(1지구) 준공	: 2022.  8.

▸동면천 하천정비공사 착공	: 2022.  9.

◦ 만경강의 역사·문화·관광 등 종합적 거점기능을 수행하고 다양한 문화체험공간을 제공하는 만경강문화관 개관	: 2022.  3.

◦ 도로조명 설치 및 정비를 통한 밝은거리 조성으로 안전한 통행로 확보

▸노후가로등 정비(565개소), 보안등 신규 설치 및 이설(186개소), 도로조명 민원처리(4,282건)

□ 반      성

◦ 시군도 농어촌도로 편입토지 협의매입이 지연되어 예산집행률이 다소 저조함    ⇒  앞으로는 토지수용재결절차를 병행하여 사업추진에 차질이 없도록 노력하겠음

2022 주요업무결산

		시·군도 및 농어촌도로 확포장 서수~평장간 국도대체우회도로 개설 오산 신지~영만간 국도대체우회도로 개설 지방하천 왕궁천 정비사업 지방하천 동면천 정비사업 진사소하천 정비사업 황각소하천 정비사업 만경강 친수시설 유지관리 만경강 문화관 운영 및 관리 금강 용안생태습지 유지관리 하천제방 유지관리 도로조명 조도개선

1		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 29개노선 L=22.57km, B=8.0~24.0m

◦ 총사업비 : 45,309백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투 자	2022년	2023년이후	비 고
45,309	13,874	6,650	24,785

□ 추 진 실 적

◦ 공사 완료 4개소	: 2022. 1. ~ 9.

▸오산역~상아마을간 도로확포장 외 3개소

◦ 공사 중 4개소	: 2022. 1. ~ 9.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장 외 3개소

◦ 보상 중 13개소	: 2022. 1. ~ 9.

▸오산면 소재지 진입도로확포장 외 12개소

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 6개소	: 2022. 1. ~ 9.

▸왕궁 신호~용남 위험도로구조개선사업 외 5개소

◦ 기타 2개소	: 2022. 1. ~ 9.

▸시·군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본정비계획수립용역 외 1개소

□ 마무리 대책

◦ 실시설계용역 추진 6개소	: 2022. 10.~12.

▸오산 용연선 도로확포장공사 외 5개소

◦ 공사 및 토지보상 추진 17개소	: 2022. 10.~12.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장 외 3개소

▸삼성 하나로~외화간 도로확포장 외 12개소

시ㆍ군도 및 농어촌도로 사업추진현황 (계속사업)

(단위 : 백만원)

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	22예산액	금 후
계		29개노선		L=22.57km B=8.0-24m	45,309	13,874	6,650	24,785
준 공 (4)	농어촌 도 로 (4)	오산203호 (신수선)	오산역-상아마을간 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	250	200	50	-	준공
		춘포103호 (신화선)	춘포토다리-덕동간 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,540	750	790	-	준공
		왕궁207호 (양곡선)	왕궁양동마을 진입도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,410	980	430	-	준공
		금마102호 (누부선)	금마누동-신촌간 도로확포장	L=1.01km B=8.0m	980	580	400	-	준공
공 사 (4)	시 도 (1)	1268호	어양어곳-부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,000	2,150	450	400	40% 명시
	농어촌 도 로 (2)	황등104호 (황팔선)	황등도선-외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	800	400	400	-	80%
		금마101호 (서삼선)	금마갈산-서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,609	879	900	830	40% 명시
	군 도 (1)	9호	낭산-시명간 선형개량사업	L=0.40km B=8.0m	1,000	1,000	-	-	10% 국비50% 명시
보 상 (13)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,780	730	500	2,550	65%
	군 도 (2)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.85km B=24.0m	5,000	1,100	1,000	2,900	50% 사고
		21호	왕궁온수~시대간 (황암~상발)확포장	L=3.00km B=8.0m	2,803	616	-	2,187	57%
	농어촌 도 로 (9)	왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동-군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	-	700	45%
		삼기203호 (석라선)	하나로-소간촌간 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	1,400	600	100	700	95%
		금마202호 (서오선)	금마신정-중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	2,450	600	300	1,550	55%
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,330	130	300	900	39%
		왕궁303호 (사곡선)	왕궁가좌마을 진입로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,116	103	-	1,013	63%
		왕궁302호 (신평선)	왕궁평화촌~평리간 도로확포장	L=1.30km B=8.0m	3,445	180	-	3,265	52%
		춘포311호 (노적선)	춘포 노적선 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	700	600	-	100	10% 명시 사고
		함라301호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	100	400	1,570	0% 명시
		춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	100	1,300	0%
	미지정 (1)		황등하동-동연지하차도간 도로확포장사업	L=0.63km B=8.0m	1,250	500	200	550	40%
실 시 설 계 (6)	군 도 (2)	19호	왕궁신호-용남 위험도로구조개선사업	L=0.50km B=8.0m	486	486	-	-	국비50% 사고
		7호	성당삼산마을 회전교차로	회전교차로 1식	400	300	-	100	특교세 명시
	농어촌 도 로 (4)	오산301호 (용연선)	오산 용연선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	900	100	-	800	명시
		삼기208호 (만대선)	삼기만대선 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	신규
		금마303호 (종구선)	금마종구선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,500	-	150	1,350	신규
		망성201호 (신하선)	망성신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	1,000	-	100	900	신규
기 타 (2)			시,군도 도로관리계획 및 농어촌도로기본정비계획수립용역	1식	320	320	-	-	명시
			서부내륙고속도로삼기하이패스 I.C타당성조사용역	1식	70	70	-	-	사고

2		서수~평장간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 2,950억원(국 2,850 시 100)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2022년	2023년이후	비 고
계	2,950	22	327	2,601
국 비	2,850	22	317	2,511
시 비	100	0	10	90

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청(익산시 → 동지역 토지보상)

□ 추 진 실 적

◦ 2공구 도로구역결정고시	: 2022.  2. 23.

◦ 2공구 업무협약체결(동지역 토지보상)	: 2022.  5. 13.

◦ 황등지역 집단민원 구간 관계기관 협의(1공구)	: 2022.  5. 23.

◦ 2공구 보상협의회 설치 및 운영	: 2022.  6.  8.

◦ 1공구 도로구역결정 주민의견청취 공고	: 2022.  6. 20.

◦ 2공구 동지역 보상계획 공고	: 2022.  6. 28.

□ 마무리 대책

◦ 2공구 동지역 손실보상 협의	: 2022. 11.~2023. 12.

3		오산 신지~영만간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 신지리~영만리(국도23호~국도21호)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2030. 12.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=7.10km, B=20.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 1,888억원(국 1,888)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2022년	2023년이후	비 고
계	1,888	4	15	1,869
국 비	1,888	4	15	1,869

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 준공(1차분, 395백만원)	: 2022. 1. 26.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수(2차분, 1,500백만원)	: 2022. 1. 27.

◦ 기본 및 실시설계 노선계획(안)공람 공고	: 2022. 7. 5.

◦ 기본 및 실시설계 주민설명회 개최	: 2022. 7. 14.

□ 마무리 대책

◦ 노선계획(안) 주민의견 검토 및 실시설계용역 추진	: 2022. 10.~12.

4		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2023. 11.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9km, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원 (국 10,093 도 23,065 시 14,210)

(단위 : 백만원)

공구별	총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후
계	47,368	32,696	6,000	8,672
1지구	24,693	23,693	1,000	-
2지구	22,675	9,003	5,000	8,672

▸2022년 예산액 : 6,000백만원 (도 4,200 시 1,800)

□ 추 진 실 적

◦ 왕궁천(1지구) 공사 완료	: 2022. 8.

▸위    치 : 흥암교 ~ 익산천 합류점(L=4.62km)

▸공사내용 : 축제 및 보축, 교량재가설(5개소)

◦ 왕궁천(2지구) 공사추진(2차분)	: 2022. 1. ~ 11.

▸광암1교, 신기교 설치완료

▸호안블록 설치중(공정률 80%)

▸전체 공정률(2지구) : 70%

□ 마무리 대책

◦ 왕궁천(2지구) 공사(2차분) 준공	: 2022. 11.

◦ 왕궁천(2지구) 공사(3차분) 착공	: 2023. 3.

5		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 6.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축(L=6.1㎞), 교량 재가설(7개소), 둑마루포장(콘크리트 L=6.1㎞, B=4.0m) 등

◦ 총사업비 : 17,317백만원(국 1,000 도 11,122 시 5,195)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년이후
17,317	4,650	3,000	9,667

▸2022년 예산액 : 3,000백만원 (도 2,100 시 900)

□ 추 진 실 적

◦ 계약심의위원회 심의	: 2022.  3.

◦ 원가심사(전라북도) 완료	: 2022.  6.

◦ 건설사업관리용역(1차분) 착수	: 2022.  8.

◦ 동면천 하천정비공사(1차분) 착공	: 2022.  9.

□ 마무리 대책

◦ 동면천 하천정비공사(1차분) 준공	: 2023.  2.

◦ 동면천 하천정비공사(2차분) 착공	: 2023.  3.

6		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.687㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6㎞, 교량 재가설 6개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,066)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년 이후
1,500	200	1,300	0

▸2022년 예산액 : 1,300백만원 (시비 100%)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역	: 2022. 1. ~ 4.

▸주민설명회(2차)	: 2022. 2. 24.

◦ 계약심사 및 공사 발주	: 2022. 5.

◦ 공사 착공	: 2022. 6.

◦ 공사 일시중지	: 2022. 7.

◦ 편입토지 등 감정평가 및 보상협의	: 2022. 9. ~

□ 마무리 대책

◦ 공사 재착공	: 2023. 3.

◦ 공사 준공	: 2023. 12.

7		황각소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 신용리 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.753㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축, 교량 재가설 등

◦ 총사업비 : 2,000백만원(설계 150, 보상 350, 공사 1,500)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2022년도	2023년 이후
2,000	0	200	1,800

▸2022년 예산액 : 200백만원 (시비 100%)

□ 추 진 실 적

◦ 토질조사용역 착수 및 준공	: 2022. 2. ~ 3.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 3.

▸공정률 50%

◦ 소규모환경영향평가 용역 착수	: 2022. 9.

□ 마무리 대책

◦ 실시설계 관련부서 협의	: 2022. 11.

◦ 실시설계용역 준공	: 2023. 2.

◦ 황각소하천 정비공사 착공	: 2023. 3.

◦ 황각소하천 정비공사 준공	: 2024. 12.

8		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=28km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 주요시설 : 6개지구 (익산지방국토관리청시행)

구 분	친수시설물	인계·인수
신지지구	자전거도로 5.42km, 친수공간 등	2016. 12.
목천지구	자전거도로 2.32km, 파크골프장 등	2016. 12.
춘포지구	자전거도로 4.0km, 축구장, 수변공원 등	2017. 1.
화전지구	자전거도로 1.3km, 구담교, 친수공간 등	2019. 1.
반월지구	자전거도로 2.8km, 축구, 야구, 족구, 농구, 인라인장 등	2021. 3.
마산지구	자전거도로 5.87km, 친수공간 등	2021. 3.

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 1,680백만원 (국 1,228 시 452)

※ 파크골프장 18홀 증설 ‘22년 특별교부세 : 900백만원

◦ 주요내용 : 친수시설관리, 제방도로 및 자전거도로 제초, 시설물보수, 목천지구 파크골프장(18홀) 증설 등

□ 추 진 실 적

◦ 만경강 환경정비사업 추진(1~6차)	: 2022. 3.~9.

▸기간제인부(2명/일) 환경정비(쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등)

◦ 만경강 친수시설 유지관리	: 2022. 1.~9.

▸휴게시설 설치(음수대 2, 흙먼지떨이기 1)

▸제방 및 자전거도로, 산책로 풀깎기(A=166,100㎡, 2회)

▸자전거도로 볼라드·차선유도봉 설치(5개소), 전망데크 보수공사(4개소)

▸이미지 방지턱 설치(4개소), 태양광가로등(12개소), 이동식퍼걸러(5개소)설치

▸파크골프장 예초(A=9,600㎡, 3회) 및 모래부설(배토) 공사

◦ 만경강야외수영장 타당성 및 기본계획 구상용역 착수	: 2022. 6.

◦ 만경강 목천지구 파크골프장 증설(18홀) 실시설계 용역 착수	: 2022. 7.

□ 마무리 대책

◦ 만경강 환경정비사업 완료	: 2022. 12.

◦ 하천구역 출입 자동차단시설 설치 완료(만경교 언더패스)	: 2022. 11.

◦ 만경강 야외수영장 타당성 및 기본계획 구상용역 완료	: 2022. 12.

◦ 만경강 파크골프장 증설 실시설계 및 행정절차 진행	: 2022.7.~2023.7.

▸하천점용허가(환경청), 소규모환경영향평가, 공공디자인심의 등

9		만경강 문화관 운영 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 228백만원(시비)

◦ 시설규모 : 부지면적 13,814㎡ (지상2층, 지하1층, 연면적 1,658㎡)

생태전시관, 체험관, 다목적실, 야외광장 등

◦ 주요내용 : 만경강 문화관 운영 및 시설물 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 만경강 문화관 기간제 근로자 및 시간선택임기제 채용	: 2022. 2.

▸기간제근로자 4명(운영업무보조 2, 환경미화 1, 조경및시설관리 1), 시간선택임기제 1명

◦ 만경강 문화관 개관식 및 운영	: 2022. 3. ~

◦ 만경강 주제 사진 전시회(30점)	: 2022. 3. ~ 5.

◦ 반려식물 소품제작 등 「자연 담은 체험 프로그램」 운영	: 2022. 5. ~ 9.

▸수·목·토요일/ 익산시민 및 관내 단체 대상/ 15~20명(회당)/ 37회 실시(537명)

◦ 조경 등 시설 유지관리	: 2022. 4. ~ 9.

▸제초 및 풀깎기(6,000㎡, 3회), 관수시설(스프링클러) 설치

▸옥상정원 국화 식재(133㎡, 3,325본)

□ 마무리 대책

◦ 만경강문화관 지주간판 설치 완료	: 2022. 10.

◦ ‘22년「자연 담은 체험 프로그램」운영 완료(연 828명 계획)	: 2022. 12.

10		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 전망데크 연결도로 안전난간설치, 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초, 노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 985백만원 (국 440 시 545)

□ 추 진 실 적

◦ 금강 용안생태습지 환경정비사업 추진(1~6차)	: 2022. 3. ~ 9.

▸기간제인부(30명/일) 환경정비(쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등)

◦ 친수시설 유지관리	: 2022. 3. ~ 9.

▸산책로·배수로 정비(L=6.4km) 및 풀깎기(9.5km, 2회)

▸전망데크 연결도로 안전난간 설치(L=400m)

▸사계절 초화류 파종 및 식재(유채 외 8종 42,500㎡)

- 유채(14,000㎡), 꽃백일홍(3,700㎡), 해바라기(2,800㎡), 꽃잔디(1,800㎡), 코스모스(7,700㎡), 아스타국화(4,400㎡), 가우라(6,480㎡) 국화·맥문동(1,620㎡. 농업기술센터 협업)

□ 마무리 대책

◦ 데크광장(A=240㎡) 및 화장실(2개소) 보수 완료	: 2022. 11.

◦ 용안생태습지 환경정비사업 완료	: 2022. 12.

11		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 집중호우대비 시설물보수, 하상준설, 지장물제거, 제방 및 호안 제초, 예초 등

◦ 총사업비 : 2,818백만원(도 450 시 2,368)

□ 추 진 실 적

(단위 : 백만원)

구 분	단 위 사 업 별	2022 예산액	주 요 내 용	실 적
	합 계	2,818
준설	어량천 하천준설	100	하상준설 및 수목제거	완 료
	필동천 하천준설	50		완 료
	목천동 목천포천 하천준설	50		완 료
	대조천 하천준설	100		완 료
	춘포면 익산천 하천준설	50		완 료
	성당면 외두천 하천준설	60		완 료
	금마면 외산천 하천준설	50		완 료
	탑천 하천준설	150		완 료
	익산천 하천 준설	159		완 료
	호월천 하천 준설	63		완 료
	오산천 하천 준설	85		11월중
	강경천 하천 준설	85		완 료
	은기동 중앙마을 소하천 준설	19		12월중
	화초천 하천 준설	100		진행중
제방보수 및 보강	소하천 유지보수	600	21년 응급복구 및 22년 호우피해 대비 등	연 중
	덕기동 익산천 제방보수	100		완 료
	도천마을 교량연석 보수 및 확장	7		완 료
	기양천 제방 보수	75		완 료
	오산면 오산천 제방보수	37		완 료
	여산면 호월천 제방보수	23		완 료
	석암동 목천포천 제방보수	150		12월중
둑마루 제방포장	여산면 강경천 제방포장	50	제방(둑마루) 콘크리트 포장 등	완 료
	죽청천 제방포장	220		완 료
제초	지방하천 제방 제초(10개소 등)	373	제방 제초작업 및 수목제거	완 료
	석왕천 제방 제초	10	10월중	10월중
안전점검	오산제 등 9개소 정기안전점검용역	12	제방 및 배수문에 구조적 안전성 및 손상상태 점검	11월중
	원수우안1지구 외 6개소 정밀 안전점검 용역	40		완 료

□ 마무리 대책

◦ 지방 및 소하천 하천제방 유지관리 사업 완료           : 2022. 12.

12		도로조명 조도 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 주요내용 : 생활환경개선 보안등 설치 외 13개사업

▸우범지역 및 야간통행 불편지역 도로조명 보수 및 설치

◦ 총사업비 : 1,778백만원

(단위 : 백만원)

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산	비 고
합 계		14개 사업	1,778
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등 신규설치 1식	298	2회추경 82백만원
노후 가로등 정비	도심지역 가로등 유지보수	가로등 보수단가 1식	130
	산업단지 가로등 유지보수	가로등 보수단가 1식	40
	읍면지역 보안등 보수	보안등 보수단가 1식	120
	동지역 보안등 보수	보안등 보수단가 1식	90
	전기안전점검부적합보수단가	부적합 보수단가 1식	30
	노후 보안등기구 교체	보안등 교체 및 정비 1식	42
	가로등 노후 점멸기 교체공사	점멸기 교체 및 정비 1식	23
	도심지역노후가로등교체공사	노후가로등정비 1식	100
	노후가로등LED교체공사	LED등기구교체 1식	100
	산업단지조도개선공사	등기구 교체 및 정비 1식	80
	영등동 가로환경 가로등 정비사업	가로등 교체 및 정비 1식	650
	동산육교~모현교 간 가로등설치	LED가로등22개소설치	55	2회추경
	중앙로5길 보안등교체공사	보안등23개소 교체	20	2회추경

□ 추 진 실 적

◦ 보안등 신규설치사업(147백만원 집행)	: 2022. 1.~ 9.

▸보안등 186개소 신규 설치 및 이설

◦ 노후가로등 정비사업(468백만원 집행)	: 2022. 1.~ 9.

▸LED가로·보안등 565개소 교체, 기타 가로(보안)등 보수 및 정비 등

□ 마무리 대책

◦ 보안등신규설치, 노후가로등정비 등 잔여사업 완료	: 2022. 12.