2022. 10. 31.

제247회 익산시의회(임시회)

2022 주요업무 결산보고

	환경안전국

시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 예산집행실적
□	2022 주요성과 및 반성
□	2022 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전예방 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 CCTV 운영을 통한 시민중심의 안전망 구축 안전 및 보건에 관한 체계적인 관리시스템 구축으로 중대재해예방

일  반  현  황

□ 기          구

							시민안전과
안전총괄			사회재난				자연재난			방재시설			민 방 위			CCTV				중대재해예방TF팀

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24		1	6	7	5	5
현 원	26		1	8	6	3	8
증 감	2		-	2	△1	△2	3

□ 사  무  분  장

◦ 안전관리계획 총괄, 안전문화교육, 시민안전보험, 안전신문고 운영,재난관리기금 운용, 재난안전상황실 운영, 안전관련 민간 협력체계구축 등

◦ 재난안전통합지원본부 운영(사회재난), 재난대응 안전한국훈련, 유‧도선사업, 승강기 보수업 등록 및 관리, 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설 관련 등

◦ 재난안전통합지원본부 운영(자연재난), 배수펌프장 및 배수문 유지관리, 가뭄‧한파‧폭염 종합대책, 자연재난 사전대비, 예‧경보시설, 그늘막 관리 등

◦ 사전재해영향성 검토 우수저류시설 사업, 재해 예방 및 복구 사업, 자연재해위험지구 정비사업, 급경사지 관리, 소규모위험시설 취합 등

◦ 국가기반체계 보호 및 비상대비관련, 을지‧화랑‧충무훈련, 충무계획, 민방위 시설 및 장비관리, 통합방위협의회 운영, 민방위 기본계획 수립, 사회복무요원관리 등

◦ 통합관제센터용 CCTV 설치 및 유지보수 관리, 마을방범용 CCTV 설치 및 유지보수 지원, 통합관제센터 모니터링 용역관리 등

◦ 중대재해예방 종합계획 및 주요정책 수립, 중대재해 매뉴얼 작성 및 운영, 관련법령상 이행 조치 관리, 산업안전보건 관리체계 구축 및 사업장 점검 등

□ 방재시설 및 재해취약시설(지구) 현황

구 분	계	배 수 펌프장	수 문	게이트 펌 프	대규모 공사장	산사태	인명피해 우려지역
개소	78	9	11	1	10	30	17

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	18개소	-	102개소	6개소	36개소	15,425점

□ CCTV 설치 현황

구 분	총 계	통합관제센터 관리					자체관리 (마을방범용)
		소 계	방범용	차량번호 판 독 용	아동용	어 린 이 보호구역
개소	1,626	913	607	103	83	120	713
대수	5,572	2,851	2,107	140	173	431	2,721

□ 위원회 현황

위원회명	구 성	근 거	비고
안전관리위원회	15명 (당연15)	익산시 안전관리위원회의 구성 및 운영에 관한 조례	1회 개최
재난관리기금 운용심의위원회	9명 (당연4, 위촉5)	익산시 재난관리기금의 운용 및 관리에 관한 조례	6회 개최
안전관리민관 협력위원회	19명 (당연7, 위촉12)	익산시 안전관리민관협력위원회 구성 및 운영 조례	대규모 재난 발생시 개최
재해영향평가 심의위원회	17명 (당연2, 위촉15)	익산시 재해영향평가심의위원회 구성 및 운영 규칙	4회 개최

2022 예산집행실적

【 2022. 9. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
시민안전과				53,934,427	23,956,708	29,977,719	44.4%
	재해및재난예방			44,265,250	15,493,923	28,771,327	35.0%
		인적재난예방사업운영		6,580,453	6,467,565	112,888	98.3%
			재난대응종합훈련	29,300	18,000	11,300	61.4%	11월말 집행예정
			국가재난대응종합훈련	5,790	0	5,790	0.0%	11월말 집행예정
			재난관리시설물안전점검	81,000	51,490	29,510	63.6%	11월말 집행예정
			안전도시만들기	46,872	33,842	13,030	72.2%
			안전도시만들기(보조)	94,010	94,010	0	100%
			코로나19행정명령이행시설 재난지원금지급	6,223,481	6,223,480	1	100%
			코로나19 생활방역비	100,000	46,743	53,257	46.7%	11월말 집행예정
		자연재난예방사업운영		346,473	282,264	64,209	81.5%
			배수장,수문유지관리	250,473	203,487	46,986	81.2%
			배수장,수문유지관리지원	87,000	76,418	10,582	87.8%
			풍수해보험	9,000	2,359	6,641	26.2%	2,3분기 보험가입비 10월 지출예정
		재해재난대비사업운영		666,648	429,425	237,223	64.4%
			재해재난예방및복구지원	440,841	271,150	169,691	61.5%	침수흔적도 작성용역중
			재해재난예방 및 복구지원(보조)	112,000	102,589	9,411	91.6%
			자율방재단운영관리	37,497	3,825	33,672	10.2%	11월중 워크숍 예정
			자율방재단운영관리(보조)	20,150	9,450	10,700	46.9%	10.13. 상해보험 연장가입
			재난종합상황실운영	46,060	32,460	13,600	70.5%
			재난안전통신망단말기구입	10,100	9,951	149	98.5%
		승강기 안전관리		10,000	10,000	0	100%
			승강기 안전관리개선	10,000	10,000	0	100%
		재해위험·취약지역정비		36,661,676	8,304,669	28,357,007	22.7%
			우수저류시설 설치(보조)	8,575,620	3,346,767	5,228,854	39.0%	장기계속사업 ‘23.6 준공예정
			재해위험지역정비(보조)	22,386,619	3,062,634	19,323,984	13.7%	계속사업 설계에 따른 공사비 집행 지연
			급경사지정비사업(보조)	5,061,670	1,777,233	3,284,437	35.1%	계속사업 토지 매입 지연
			재해위험지역정비	297,467	118,035	179,432	39.7%	자연재해저감종합계획 준공시기 미도래(12월)
			전선로 지중화 사업	340,300	0	340,300	0.0%	한전, KT 등 실시협약 협의중

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	안전총괄관리			3,644,034	2,759,222	884,811	75.7%
		안전관리		3,644,034	2,759,222	884,811	75.7%
			CCTV 통합관제센터 운영및유지관리	1,966,034	1,598,908	367,126	81.3%
			방범용CCTV설치지원	611,000	439,098	171,902	71.9%
			읍면동방범용 CCTV설치	1,067,000	721,217	345,783	67.6%	11월말 준공
	민방위운영			802,159	491,753	310,406	61.3%
		민방위대관리		802,159	491,753	310,406	61.3%
			국민참여민방위의날 훈련경비	1,050	600	450	57.1%	훈련미실시로 인한 반납
			국민참여민방위의날 훈련경비(보조)	1,900	1,900	0	100%
			을지연습운영	18,338	18,338	0	100%
			민방위화생방 방독면보급	1,200	1,200	0	100%
			민방위시설·장비유지보수	27,865	16,050	11,815	57.6%	경보시설 축전지 교체 6,300천원(10월 집행) 비상급수시설전기요금 4,000천원(12월 집행) 기타 소모성자재 구입 등
			민방위교육훈련 및 시설장비확충	3,000	3,000	0	100%
			민방위교육훈련 및 시설장비확충(보조)	11,820	1,620	10,200	13.7%	사이버교육으로 인해 미집행
			사회복무요원관리 (사회서비스분야인력경비)	664,190	388,904	275,286	58.6%	월별집행
			의용소방대지원	17,500	14,500	3,000	82.9%
			민방위교육 운영비(보조)	15,296	5,700	9,596	37.3%	11월말 준공
			민방위경보 사각지역해소(보조)	40,000	39,941	59	99.9%
	재무활동			5,189,527	5,178,352	11,175	99.8%
		내부거래지출		4,200,000	4,200,000	0	100%
			내부거래지출	4,200,000	4,200,000	0	100%
		보전지출		989,527	978,352	11,175	98.9%
			보전지출	989,527	978,352	11,175	98.9%
	행정운영경비			33,457	33,457	0	100%
		기본경비		33,457	33,457	0	100%
			기본경비	33,457	33,457	0	100%

2022 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2022년 재난관리평가 최우수기관 선정 (전국 226개 시군구 중 1위)

◦ 예방중심의 안전관리로 재난 없는 도시 도성

‣익산시민 안전보험 가입        :  15개 항목 109백만원(지방재정공제회)

‣초․중․고 맞춤형 안전교육 :  29개 학교 38회 2,886명

◦ 코로나19 대응 추진으로 감염병 확산 방지 및 대시민 지원

‣코로나19 대응 익산시 재난안전대책본부 운영 및 사회적 거리두기 시행

‣자가격리자 구호물품 및 방역물품 지급	: 16,850세트(건)

‣행정명령 이행시설 재난지원금 및 사각지대 재난지원금 지급	: 9,650개소

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 실시로 재난 예방

‣상반기 정기안전점검 19개소 / 하반기 정기안전점검 9개소 완료

‣정밀안전점검 10개소 완료

◦ 재해위험·취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화

‣인화지구 우수저류시설 설치공사 추진	: 공정률 80%

‣재해위험개선지구 정비사업 추진 : 4개소(석천대, 석탄, 여산, 판문)

‣급경사지 정비사업 추진	: 4개소(송천, 성당, 아리랑, 용두산)

‣자연재해저감 종합계획 재수립용역 추진

◦ 용도별 CCTV 설치로 시민의 생명·재산과 교통 안전 확보	: 135개소 392대

‣통합관제센터 관리용	: 64개소 208대

‣마을자체 관리용	: 71개마을 184대

□ 반      성

◦ 재해위험·취약지역정비 사업 지연

‣최근 추진중인 장기계속사업이 실시설계용역 단계로서 예산 집행률이 저조하나, 석탄지구 등 3개 사업이 공사 발주 및 착공한 상황으로 조속한 사업 추진에 만전을 기하겠음

2022 주요업무결산

		시민안전보험 및 안전사고 예방활동 추진 집중안전점검(국가안전대진단) 추진 코로나19 대응 추진 화재 대피용 방연 마스크 구입 및 비치 제3종 시설물 지정 실태조사 용역 배수펌프장·배수문 정기·정밀안전점검 배수펌프장‧배수문 유지보수 재난재해예방 시설물 유지관리 용역 인화지구 우수저류시설 설치공사 석탄 재해위험개선지구 정비사업 여산 재해위험개선지구 정비사업 판문 재해위험개선지구 정비사업 급경사지 정비사업 국가 비상대비훈련 및 실용적 민방위훈련 CCTV통합관제센터 운영 및 용도별 CCTV 설치 중대재해예방 업무 추진

1		시민안전보험 및 안전사고 예방활동 추진

□ 사 업 개 요

◦ 익산시민 안전보험

‣가입대상 : 익산시에 주소를 둔 시민(외국인 포함)

‣사 업 비 : 110백만원 (도비 23, 시비 87)

‣보장내용 : 15개 항목 (사망 및 후유장해 정도에 따라 결정)

‣보장금액 : 보장내용에 따라 최대 1천만원 한도

◦ 안전사고 예방 활동

‣초‧중‧고 맞춤형 안전교육  : 37개 학교 (초 25, 중 8, 고 4) 3,506명

‣안전 점검의 날 운영       : 월 1회 시기별․테마별 운영

□ 추 진 실 적

◦ 익산시민 안전보험 가입 및 홍보	:  2022. 3. ~ 10.

‣기간/ 금액 : 2022. 3. ~ 2023. 2./ 109백만원(도 23, 시 86)

‣항목/ 보상 : 15개 항목 (13개에서 2개 항목 추가)/ 42명 106백만원

‣홍보 추진 : 전입신고 시 안내 (리플렛 4,000부 배부), 시 공식 SNS 등

- 안전 점검의 날 캠페인 시, 관내 행사 (축제)장 방문 홍보

◦ 안전 점검의 날 운영	:  2022. 3. ~ 10.

‣8개소 210명 (개학기 학교 주변, 다중이용시설, 여름철 호우대비 시설 등)

◦ 초‧중‧고 맞춤형 안전교육	:  2022. 9. ~ 10.

‣29개 학교 38회 2,886명

□ 마무리 대책

◦ 초‧중‧고 맞춤형 안전교육(8개 학교 10회 620명)	: 2022. 11.

◦ 시민안전보험 홍보 (의료시설, 어린이시설, 노인복지시설 등)   :  2022. 11. ~ 12.

◦ 안전 점검의 날 운영	: 매월 4일

2		집중안전점검(국가안전대진단) 추진

□ 추 진 개 요

◦ 명칭변경 : (기존) 국가안전대진단 → (변경) 대한민국 「안전대전환」을 위한 집중안전점검

◦ 추진목적 : 세월호 침몰사고('14.4.) 등 대형사고  발생에 따른 안전 사회에 대한 국민적 요구로 2015년 이후 매년 민관합동 안전점검 실시

◦ 추진기간 : 2022. 8. 17. ~ 2022. 10. 14.(59일간)

◦ 점검대상 : 최근 사고 발생시설, 국민관심 분야 등

▸관내 건축시설, 교통시설, 생활 및 여가, 문화재, 환경 및 에너지, 기타 시설

◦ 사 업 비 : 20백만원(재난관리기금)

◦ 점검내용 : 시설물의 구조적 안전성, 안전관리실태, 법·제도 등

◦ 점검방법 : 민·관 합동점검(공무원, 유관기관, 민간전문가)

□ 추 진 실 적

◦ 집중안전점검 세부 추진계획 수립	: 2022. 7. ~ 8.

▸점검대상시설 확정, 점검 방법, 홍보 방안 등

▸점검대상시설 총 92개소 선정(부처 위임시설 총 15개소, 지자체 자체선정 총 72개소, 주민신청시설 총 5개소)

◦ 민관합동점검 기동반 구성	: 100여명(공무원 24, 민간전문가 8, 3개민간단체 70)

▸공무원, 유관기관, 민간전문가(건축, 소방, 전기, 가스 등)로 구성

◦ 집중안전점검 추진(100% 완료)	: 2022. 8. 17. ~ 10. 14.

▸대상 : 92개소 / 실시 : 92개소

▸단체장 및 부단체장 현장 점검 실시(4회)

□ 마무리 대책

◦ 집중안전점검 결과 분석 및 후속조치 지속 독려	: 상  시

▸점검결과 공개 및 국가안전대진단 사이트에 입력, 이행확인 등

3		코로나19 대응 추진

□ 추 진 개 요

◦ 확진자(10.5. 0시 기준) : 전국 24,882,894명(인구의 48.2%), 전북 843,516명  (47.2%), 익산 130,852명(47.1%)

◦ 코로나19 대응 익산시 재난안전대책본부 운영 및 사회적 거리두기 시행

▸행정명령 단계별 방역수칙 대시민 홍보(운영시간, 사적모임, 행사·집회, 기타 등)

▸공공 ⸱ 다중이용시설 및 유관기관 방역대책 수립 및 관리

◦ 코로나19 재난지원금, 확진자 구호물품, 방역물품 등 지원

□ 추 진 실 적

◦ 코로나19 방역 컨트롤 타워 재난안전대책본부 운영

▸중앙재난안전대책본부 영상회의 참석, 방역추진상황 총괄관리

▸거리두기에 따른 공공시설 운영‧중단 조정 및 생활방역수칙 대시민 홍보 등

◦ 다중이용시설 방역수칙 준수 현장 점검 및 방역관리

▸시설별 방역수칙 현장 점검	: 47개 업종 8,666개소

▸현장 지도․점검 및 방역수칙 위반 행정처분	: 212건(지도 209건, 과태료 3건)

▸추석명절 (공공)다중이용시설 특별방역 지도점검 : 19개 부서 1,636개소

◦ 코로나19 행정명령 이행시설 재난지원금 및 사각지대 재난지원금 지급

▸코로나19 행정명령 이행시설 도 재난지원금(개소당 800천원)	: 7,786개소 6,229백만원

▸코로나19 지원 사각지대 재난지원금(개소당 600천원)	: 1,864개소 1,118백만원

◦ 구호물품 및 방역물품 지급

▸자가격리자 구호물품 지급	: 15,650세트(건) 633백만원

▸코로나19 감염취약시설 방역물품 꾸러미(마스크, 소독제) 지급 : 1,027개소 1,200세트

□ 마무리 대책

◦ 코로나 신종 변이 및 재유행 대비 대응체계 유지

▸겨울철 코로나 재유행 및 신종 변이 확산 방지 대응체계(재난 컨트롤타워) 운영

4		화재 대피용 방연마스크 구입 및 비치

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 화재 취약계층 이용시설에 방연마스크 ⃰ 비치로 긴급상황

발생시 인명사고 최소화

* 화재시 연기로부터 기도를 보호하기 위해 방연필터가 내장된 대피용 마스크

◦ 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 11.

◦ 사 업 비 : 16백만원(시비)

◦ 사 업 량 : 방연마스크 1,500장(보관함 75개 포함)

◦ 비치장소 : 19개소(장애인․노인종합복지관, 요양병원 등)

※개소당 20~300장 비치

◦ 관련법령 :「익산시 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원 조례」

□ 추 진 실 적

◦ 화재 대피용 방연마스크 구입 및 비치 계획 수립	: 2022. 3.

◦ 화재 대피용 방연마스크 소요량 조사	: 2022. 3.

▸화재 취약계층 관련부서 : 복지정책과, 경로장애인과, 아동복지과, 여성청소년과

◦ 화재 대피용 방연마스크 구입 및 보급	: 2022. 4. ~ 5.

◦ 화재 대피용 방연마스크 추가 구입 및 보급	: 2022. 9.

▸화재 취약계층 관련부서 : 보건지원과

□ 마무리 대책

◦ 2023년도 방연마스크 소요량 조사	: 2022. 10. ~ 12.

◦ 방연마스크 사용현황 점검 및 관리	: 연중

5		제3종 시설물 지정 실태조사 용역

□ 조 사 개 요

◦ 조사목적 : 제1종, 제2종 시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물을 조사하여 제3종 시설물로 지정·고시 후 안전관리 추진

(제1종 시설물) 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물 (예: 21층 이상 건축물)

(제2종 시설물) 제1종 시설물 외에 재난을 예방하기 위해 계속적인 관리가 필요한 시설물 (예: 16층 이상 건축물)

◦ 조사기간 : 2022. 5. 4. ~ 2022. 10. 30.

◦ 조사대상 : 공동주택 및 건축물 124개소

▸공동주택 73개소, 종교시설 7개소, 병원 4개소, 체육시설 1개소, 기타 39개소

◦ 사 업 비 : 42백만원(시비)

◦ 조사내용 : 시설물 현장조사 실시 후 안전등급(상태) 결정 및 안전관리 시행

◦ 추진근거

▸「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제8조

▸「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제100조

□ 추 진 실 적

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역 발주	: 2022. 3.

▸공동주택 및 건축물 124개소

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역업체 선정	: 2022. 4.

▸(유)센이엔지건축안전진단

◦ 제3종시설물 지정을 위한 안전상태 등급 산정 조사	: 2022.  5. ~ 10.

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역 준공	: 2022. 10.

□ 마무리 대책

◦ 제3종시설물 지정·고시 및 시설물통합정보시스템(FMS) 입력 : 2022. 11.

6		배수펌프장‧배수문 정기‧정밀안전점검

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 시설물의 물리적·기능적 결함과 내재된 위험요인을 발견하고, 이에 대한 적절한 조치방안을 제시하여 시설물의 안전 확보

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 10.

◦ 사업대상 : 19개소(배수펌프장 9, 배수문 10)

◦ 총사업비 : 185백만원(도 26.1, 시 158.9)

‣정기안전점검 : 98백만원(시비)

‣정밀안전점검 : 87백만원(도 26.1, 시 60.9)

◦ 관련근거 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조

□ 추진실적

◦ 2022년도 상반기 정기안전점검 완료                     : 2022. 4.

▸점검대상 : 배수펌프장 9개소, 배수문 10개소

▸점검결과 : 전체 시설 등급 양호

▸점검방법 : 육안과 간단한 측정기기로 검사하여 시설물의 결함 손상 발견

◦ 2022년도 정밀안전점검 완료                            : 2022. 9.

▸점검대상 : 배수펌프장 7개소, 배수문 3개소

▸점검결과 : 전체 시설 등급 B등급

▸점검방법 : 외관조사 및 측정·시험 장비를 통한 정밀점검 시행

◦ 2022년도 하반기 정기안전점검 완료                     : 2022. 9.

▸점검대상 : 배수펌프장 2개소, 배수문 7개소

▸점검결과 : 전체 시설 등급 양호

▸점검방법 : 육안과 간단한 측정기기로 검사하여 시설물의 결함 손상 발견

□ 마무리 대책

◦ 안전점검 결과에 따른 보수보강 시행                 : 2023. 1월 이후

7		배수펌프장‧배수문 유지보수

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 시설물 보수보강을 통해 여름철 자연재난 즉각 대응 가능한 상태 유지

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업대상 : 21개소(배수펌프장 9, 배수문 11, 게이트펌프 1)

◦ 총사업비 : 35백만원(시비)

◦ 사업내용 : 노후 및 파손 시설물 수리 및 유지보수 전반

▸기계: 펌프 / 전기: 배터리, 차단기, 계전기, MOF 등 / 토목: 건물, 계단 등

□ 추진실적

◦ 유천 및 목천배수펌프장 노후 배터리 교체(3,770천원)	: 2022. 4.

▸유천(12V 120AH 9EA), 목천(12V 60AH 9EA) 배터리 교체

◦ 고잔배수펌프장 노후 지수펌프 교체(10,690천원)           : 2022. 5.

▸10마력 집수정 유지관리용 지수펌프 1대(7톤/분) 교체

▸신규 전기분전함 및 전선으로 교체, 신규 인버터로 교체(1EA)

◦ 성당배수펌프장 기중차단기 교체(2,200천원)               : 2022. 5.

▸노후로 인한 신규 고압 기중차단기로 교체(1EA)

◦ 고잔배수펌프장 계전기 구매설치(5,104천원)               : 2022. 7.

▸노후로 인한 신규 계전기로 교체(1EA)

◦ 목천배수펌프장 계단 보강공사(2,523천원)                 : 2022. 8.

▸출입계단 하단부 공동발생에 따른 콘크리트 보강

◦ 목천배수펌프장 MOF 및 퓨즈 구매설치(3,300천원)	: 2022. 9.

▸노후 및 파손으로 인한 신규 MOF 1EA 및 퓨즈 3EA 교체

□ 마무리 대책

◦ 시설물 수시 점검 및 시설물 보수·보강                   : 2022. 10. ~ 12.

8		재난재해예방 시설물 유지관리 용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업목적 : 시설물 유지관리 용역을 통한 재난 발생 시 즉각적인 대응체계 유지

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업대상

▸무인경비 : 배수펌프장 5개소

▸전기안전관리대행 : 배수펌프장 6개소, 배수문 1개소, 우수저류시설 1개소

▸재해문자전광판 : 2개소(중앙동, 영등동)

▸조기경보 및 자동음성통보시스템 : 조기경보 2지구(여산, 춘포), 자동음성 139개소

▸펌프장, 기상관측 CCTV : 54개소(배수펌프장, 배수문, 우수저류시설)

▸기상관측장비 및 재난안전대책본부홈페이지 : 기상관측 38개소, 홈페이지 1개소

◦ 총사업비 : 100백만원(시비)

◦ 사업내용 : 재난재해예방 시설물 월간 및 수시 점검 등 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 무인경비 용역(8백만원) 시행	: 2022. 1. ~

◦ 전기안전관리대행 용역(13백만원) 시행	: 2022. 1. ~

◦ 재해문자전광판 용역(16백만원) 시행	: 2022. 1. ~

◦ 조기경보 및 자동음성통보시스템 용역(18백만원) 시행	: 2022. 1. ~

◦ 펌프장, 기상관측 CCTV 용역(18백만원) 시행	: 2022. 1. ~

◦ 기상관측 및 재난안전대책본부홈페이지 용역(18백만원) 시행     : 2022. 1. ~

□ 마무리 대책

◦ 시설물 유지관리용역 진행                             : 2022. 10. ~ 12.

◦ 지속적인 점검을 통한 안정적인 시설물 유지관리 및 고장시 신속한 대응

9		인화지구 우수저류시설 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 동산동, 인화동 일원 도시 침수피해 예방을 위해 50년빈도 저류시설 설치(85mm/1시간, 120mm/2시간, 140mm/3시간)

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 6.

◦ 사업위치 : 익산시 주현동 203번지(1지구), 동산동 1048번지(2지구)

◦ 총사업비 : 23,000백만원[국 11,500(50%), 도 3,450(20%), 시 8,050(30%)]

▸기확보 사업비 : 20,900백만원(국 11,500, 도 3,450, 시 5,950)

▸2022년 사업비 :  2,100백만원(시 2,100)

◦ 사업내용 : 우수저류시설 설치 18,920㎥(인화1 : 8,570㎥, 인화2 : 10,350㎥)

□ 추 진 실 적

◦ 공사 착공	: 2020. 4.

◦ 우수저류시설 설치공사 추진(공정률 80%)	: 2022. 1. ~

▸1지구 : 저류조 터파기 완료, 바닥 및 벽체 시공 중

▸2지구 : 저류조 구조물 완료, 기계실 및 화장실 시공 중

□ 마무리 대책

◦ 저류시설 공사 완료	: 2022. 12.

▸토목(저류시설 등), 건축(기계실 등), 기계(펌프 등), 전기(배전반)

◦ 조경, 유출입관로, 부대시설	: 2023.  3.

◦ 우수저류조 시운전	: 2023.  4.

◦ 공사 준공	: 2023.  6.

10		석탄 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 만경강 외수위 상승 시 목천포천 하류 저지대 침수 예방을 위해 유천배수펌프장 증설(현재 26.5톤/초 → 향후 56.5톤/초)

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 석탄동 1016-91번지 일원

◦ 총사업비 : 29,165백만원[국 14,582.5(50%), 도 5,833(20%), 시 8,749.5(30%)]

▸기확보 사업비 :  9,500백만원(국 4,750,  도 1,900, 시 2,850)

▸2022년 사업비 :  9,400백만원(국 4,700,  도 1,880, 시 2,820)

▸2023년 이  후 : 10,265백만원(국 5,132.5, 도 2,053, 시 3,079.5)

◦ 사업내용 : 유천펌프장 증설 Q=23.5㎥/s→56.5㎥/s(펌프 8대 30㎥/s 증), 관로개선 L=358m

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 추진(설계 95%)	: 2020.  5. 29.

◦ 설계 경제성 검토(VE)	: 2022.  3. 25.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: 2022.  7. 13.

◦ 기술자문위원회 심의(익산시 감사위원회)	: 2022.  8. 24.

◦ 계약심의(익산시 회계과)	: 2022. 10.

◦ 공사발주	: 2022. 10.

□ 마무리 대책

◦ 공사 착공	: 2022. 12.

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

11		여산 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 강경천 외수위 상승 시 여산면소재지 일원 침수 예방을 위해 펌프장, 배수로, 우수관로, 하천정비 등 종합정비사업 시행

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 여산면 여산리 412-4번지(면소재지) 일원

◦ 총사업비 : 38,000백만원[국 19,000(50%), 도 7,600(20%), 시 11,400(30%)]

▸2022년 사업비 : 없 음

▸2023년 이  후 : 36,000백만원(국 18,000, 도 7,200, 시 10,800)

◦ 사업내용 : 배수로 신설 L=350m, 우수관로 정비 L=4,800m, 펌프장 및 저류지 1개소(V=3,400㎥), 강경천‧유성천‧닭작골천 정비

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 및 추진(설계 50%)	: 2021. 12. 23.

◦ 제1차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: 2022.  2. 16.

◦ 제2차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: 2022.   3. 17.

□ 마무리 대책

◦ 기본설계(안) 협의(행정안전부)	: 2022. 10.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: 2022. 12.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2023.  4.

◦ 공사 착공	: 2023.  6.

◦ 공사 준공	: 2025. 12.

12		판문 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 만경강 외수위 상승 시 춘포면 판문마을 저지대 일원 침수 예방을 위해 대장배수펌프장에 유량이 유입되도록 배수로 확장 및 설치

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업위치 : 익산시 춘포면 용연리 529-5번지(판문마을) 일원

◦ 총사업비 : 4,400백만원[국 2,200(50%), 도 880(20%), 시 1,320(30%)]

▸2022년 사업비 : 3,000백만원(국 1,500, 도 600, 시 900)

▸2023년 이  후 : 1,220백만원(국 610, 도 244, 시 366)

◦ 사업내용 : 수로정비 L=820m, 저류지 V=3,400㎥, 우수관개선 L=283m, 교량 4개소

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 및 추진(완료)	: 2021.  6. ~ 2022. 8.

◦ 사전설계검토 심의(전라북도)	: 2022.  7. 13.

◦ 공사원가심사(전라북도)	: 2022.  8. 12.

◦ 공사착공	: 2022. 10. 12.

□ 마무리 대책

◦ 공사 추진	: 2022. 10. ~

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

13		급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 추진배경 : 사면의 풍화작용으로 낙석‧붕괴가 발생되는 지구의 사면보강 및 낙석방지책 등의 설치를 통한 사면 안정화

□ 사업별 추진실적 및 마무리 대책

① 송천지구 급경사지 정비사업

◦ 사 업 개 요

▸사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

▸사업위치 : 익산시 웅포면 송천리 산33-4, 산 131번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=7,000㎡(1지구 L=100m, 2지구 L=175m)

▸총사업비 : 1,800백만원[국 900(50%), 도 360(20%), 시 540(30%)]

◦ 추 진 실 적

▸공사 착공 및 추진(공정률 50%)	: 2021. 10. ~

- 2지구(송천마을) 추진 및 공사완료

- 경사면 구배완화(1:1.2) L=175m, 사면보호공(식생토 : T=3㎝) 5,281㎡,

산마루측구 L=201m, 횡배수관(⦽1,000m) 3개소

◦ 마무리 대책

▸1지구(송천마을) 공사 추진	: 2022. 10. ~

- 경사면 구배완화(1:0.7) L=100m, 사면보강공(락볼트) 111공,

낙석방지책 L=101m, 낙석방지망 A=1,152㎡, 옹벽형측구 L=100m, H=2.0m

② 성당지구 급경사지 정비사업

◦ 사 업 개 요

▸사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

▸사업위치 : 익산시 성당면 성당리 503번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=1,000㎡(L=371.7m, H=1~3m)

▸총사업비 : 1,500백만원[국 750(50%), 도 300(20%), 시 450(30%)]

◦ 추 진 실 적

▸공사 착공 및 추진(공정률 5%)	: 2021. 12. ~

▸토지매입 지연에 따른 공사 일시중지	: 2022. 3.

▸사업인정을 위한 중앙토지수용위원회 협의	: 2022.  6.

▸실시계획 고시	: 2022.  6.

▸보상 실시(8명중 4명)	: 2022.  10.

◦ 마무리 대책

▸토지수용절차 이행	: 2022.  11.

▸공사 추진	: 2022.  12. ~

③ 아리랑지구 급경사지 정비사업

◦ 사 업 개 요

▸사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

▸사업위치 : 익산시 낭산면 낭산리 산 174-1번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=2,000㎡(L=320m, H=6m)

▸총사업비 : 3,518백만원[국 1,759(50%), 도 703.6(20%), 시 1,055.4(30%)]

◦ 추 진 실 적

▸실시설계용역 착수	: 2021.  5.

▸사전 설계검토 심의(전라북도)	: 2022.  2.

▸공사 원가심사(전라북도)	: 2022.  5.

▸실시설계용역 준공	: 2022.  6.

▸공사 착공(공정률 5%)	: 2022.  8.

◦ 마무리 대책

▸공사 추진	: 2022. 10.~

④ 용두산지구 급경사지 정비사업

◦ 사 업 개 요

▸기    간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

▸위    치 : 익산시 용안면 용두리 산 5-2번지 일원

▸사업내용 : 급경사지 사면정비 A=7,500㎡(L=780m)

▸총사업비 : 10,000백만원[국 5,000(50%), 도 2,000(20%), 시 3,000(30%)]

◦ 추 진 실 적

▸실시설계용역 발주	: 2022.  2.

▸실시설계용역 착수 및 추진(설계 50%)	: 2022.  4.~

◦ 마무리 대책

▸실시설계용역 완료	: 2022. 12.

▸사전설계검토 심의(행정안전부)	: 2023.  1.

14		국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

□ 사 업 개 요

◦ 국가 비상대비 훈련 : 을지연습, 화랑훈련

◦ 민방위 대원 관리 : 14,257명 (2022. 1. 10. 기준)

◦ 민방위 시설 관리 : 162개소

▸민방위 경보시설 18개소, 대피시설 102개소, 비상급수시설 42개소

□ 추 진 실 적

◦ 비상대비 훈련

▸혹한기 훈련(2. 14. ~ 2. 17.) 및 전술훈련(3.28, 3.30)

- 통합방위지원본부 운영 및 상황 유지

▸화랑훈련 실시(7. 25. ~ 7. 29.)

- 통합방위지원본부 운영, 주민신고망 운영, 작전지역 주민대피 등

▸을지연습 실시(8. 22. ~ 8. 25.)

- 전시종합상황실운영, 다중이용시설 테러대비 실제훈련, 도상연습 등

◦ 민방위 편성 및 교육

▸민방위대원 편성 : 14,257명(1~4년차 6,220명, 5년차 이상 : 8,037명)

▸민방위대원 교육 : 코로나로 인한 비대면(사이버)실시

- 본교육(4.11.~6.30.) / 보충1차(8.1.~8.31.) / 보충2차(10.4.~11.15.)

◦ 민방위 경보시설 신규 구축         : 1개소(오산면 행정복지센터 옥상)

◦ 민방위 비상급수시설 관정 사후관리 : 1개소(부송공원)

◦ 민방위 비상급수시설 추가지정 추진

▸2개소 추가지정 : 먹구봐농산(팔봉), 전라북도교육청교육연수원(금마)

▸생활용수 전항목 수질검사 실시(9.29.) → 검사 합격 시설을 추가지정

◦ 민방위 장비 확충

▸구급함(140세트), 휴대용 제독기(3개), 대피시설 비상용품함(6개) : 7,110천원

□ 마무리 대책

◦ 비대면(사이버) 민방위 보충2차 교육 실시 및 교육 독려

15		CCTV통합관제센터 운영 및 용도별 CCTV 설치

□ 사 업 개 요

◦ 용도별 CCTV 설치

▸통합관제센터용(시설비)과 마을용(민간자본보조)으로 구분하여 설치

◦ CCTV 통합관제센터 민간위탁 운영

▸관제요원(12명/3조 2교대)이 24시간 모니터링하며 사건발생시 즉시 대응

◦ CCTV 및 통합관제센터 유지보수 관리

▸용역업체 직원 2명이 상주하여 관제시스템 및 CCTV 고장시 즉시 대응

□ 추 진 실 적

◦ 용도별 CCTV 설치	(2022. 9. 30.현재, 개소/대수)

구 분	합 계	통합관제센터 관리					마을관리
		계	방범용	차량번호 판독용	아동용	어린이 보호용
누 계	1,626/5,572	913/2,851	607/2,107	103/140	83/173	120/431	713/2,721
2021.12월말까지	1,491/5,180	849/2,643	556/1,915	90/124	83/173	120/431	642/2,537
2022년도 설치	135 / 392	64 / 208	51 / 192	13 / 16			71 / 184

◦ CCTV 통합관제센터 민간위탁 운영

▸위탁기간 : 2022. 2. ~ 2024. 1.(2년), 연도별 차수계약

- 총 계약(2년) : 1,184백만원(1차분 계약 : 2022. 2. ~ 2022. 12./ 547백만원)

▸위탁업무 : 24시간 모니터링하며 긴급사건 발생시 112 및 119등에 신고하여 대응

◦ CCTV 및 통합관제센터 유지보수 관리

▸계약사항 : 기간 - 2022. 1. ~ 12.(1년)/ 금액 - 389백만원

▸관리업무 : 관제시스템(보안시스템, 네트워크 시스템 등) 및 CCTV 고장시 대응

□ 마무리 대책

◦ 용도별 CCTV 설치 완료 예정(2회 추경)	: 2022. 11.

◦ 용도별 CCTV 운영 및 관리	: 계속

16		중대재해예방 업무 추진

□ 사 업 개 요

구 분	대 상	의 무 사 항	관리사항 (시민안전과)
중 대 산 업 재 해	·일반직 공무원 1,800명 ·현업업무자 434명 (공무직 58명, 기간제 337명, 청원경찰 39명) ·도급·용역·위탁 사업	·안전보건 목표와 경영방침 설정 ·중대재해전담조직 설치 ·안전보건관리자 선임 ·종사자의견청취절차 마련 ·재해대비 매뉴얼 마련 및 조치여부 점검 ·도급·용역·위탁 시 수급자 안전관리능력 및 평가기준절차 마련 ·사업장 유해요인 확인 개선	·재해발생 시 재발방지대책 수립 및 이행 ·법정교육 이수 및 확인 보고 조치 ·법적 이행 여부 점검 및 보고 조치
중 대 시 민 재 해	·시설물안전법 : 77개소 (교량 60, 터널 2, 하천 2, 건축물 6, 상하수도 7) ·실내공기질관리법 : 8개소 (박물관 1, 도서관 3, 업무시설 3, 실내체육시설 1) ·식품위생법 : 1개소 (농산물종합가공센터)	·안전계획 수립 ·안전계획 이행점검 → 보고 → 개선조치(연2회) ·위험요인 점검 → 신고 → 개선조치

□ 추 진 실 적

◦ ‘익산시 중대재해예방 종합계획’ 수립	: 2022.  2.

◦「산업안전보건법」상 안전관리자 채용	: 2022.  4.

◦ 중대재해예방을 위한 2022년 상반기 의무이행사항 점검	: 2022.  6.

◦ 중대재해 전담조직(중대재해예방 TF팀) 구성 및 운영	: 2022.  7.

◦ ‘익산시 안전보건관리규정’ 제정	: 2022.  8.

◦ 중대재해예방 2022년 상반기 의무이행사항 점검결과보고	: 2022.  8.

◦「산업안전보건법」상 보건관리자 채용	: 2022.  9.

◦ 익산시 산업안전보건위원회 구성 및 운영계획 수립	: 2022.  9.

◦ 도급용역위탁 사업 안전보건 확보 업무처리 추진계획 수립	: 2022.  9.

◦ 익산시 산업안전보건위원회 개최	: 2022.  9.

□ 마무리 대책

◦ 2022년 하반기 익산시 관리감독자 교육	: 2022. 11.

◦ 2022년 하반기 중대재해예방 의무이행사항 점검	: 2022. 12.

◦ 2022년 4분기 산업안전보건위원회 개최                    : 2022. 12.