2023. 1.

제249회 익산시의회(임시회)

2023 주요업무 계획

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 주요성과 및 반성
□	2023 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 ‘多e로움 water’공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 스마트 미터 사업을 통한 유수율 제고 및 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	6	15	9	8	2
현 원	42	1	1	11	20	1	6	2
증 감				5	5	△8	△2

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원					임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민 단체	기관
10	2	1	2	4	1	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	273,893	272,689	99.6
도심권	218,562	218,501	99.9
읍면권	55,331	54,188	97.9

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	150,740
생 활 용 수	소 계	195,300	130,837	100%
	광 역	105,300	68,565	52.4%
	자 체	90,000	62,272	47.6%
공 업 용 수	자 체	35,000	19,903

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,312	3,340,076	100.0
가 정 용	48,434	1,658,610	49.7
일 반 용	14,959	564,849	16.9
대 중 탕 용	40	13,064	0.4
산 업 용	780	471,020	14.1
전용공업용	99	632,533	18.9

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,951.7	2.5	25.3	1,200.3	723.6

※ 자료출처 : 2021년도 국가상수도정보시스템 통계자료

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2022 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

▸노후상수도 정비사업 : 실시설계용역(공정률 90%, 사전기술검토 승인), 블록고립 및 운영(신흥 급수구역)

▸스마트 관망관리 인프라 구축사업 : 1차분(2,643백만원) 완료

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

▸상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 4개소 2.9km/757개소

▸관내 변류(제수변 및 소화전) 정비 및 교체 : 202개소

◦ 상수도관망 전문기술진단을 통한 안정적인 물 공급 방안 마련

▸관내 송수 및 배수 시설물(L=1,494km) 현장조사 용역 추진(공정률 80%)

▸성능평가 및 간접평가 시행, 관망도 전산화 착수, 환경부 사전협의

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸급수구역 확장공사 : 7개소 2.97km / 급 □ 배수관 개선공사 : 475개소 9.0km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸급수장치 수선 공사 2,094건, 수용가 옥내누수 탐사 927건

▸상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 35개소 9.4km

▸누수처 신고 포상금제 운영으로 신속 복구 : 62개소/650,000원

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

▸‘22년 부과/징수 : 25,051백만원/24,808백만원(징수율 99%)

▸노후·동파·고장 수도계량기 교체 : 2,971전

◦ 수도요금 감면 실시로 경기 침체에 따른 시민부담 해소

▸기초생활수급자 및 다자녀 등 : 115,409건, 270,633천원

□ 반      성

◦ 스마트미터사업 추진 지연

▸ 현재 검침단말기 설치공사(1~3차분) 진행 중으로 2023년 3월 중 준공 예정임

2023 주요업무계획

		지방상수도현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축> 상수도 지하시설물 지반탐사 용역 금마배수지 확충공사 급수구역 확장 및 급·배수관 개선공사 상수도 요금 부과·징수 깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 운영 신흥정수장 차염설비 설치공사 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 총사업비 : 66,493백만원

▸노후상수도 정비사업 : 60,586백만원(국 50%, 도 10%, 시 40%)

- 당초 : 55,733백만원 → 변경 : 60,586백만원(증 4,853) 환경부 승인(2022.12.29.)

※ 변경사유 : 실시설계에 따른 사전기술검토 승인(의견) 반영(블록구축 53개소, 노후관교체 L=70.9km-신흥급수구역, 유지관리 시스템 구축 1식 등)

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 5,907백만원(국비 70%, 시 30%)

- 당초 : 2,643백만원 → 변경 : 5,907백만원(증 3,264) 환경부 승인(2022.12.13.)

※ 변경사유 : 사업물량 추가 (스마트미터 검침단말기 설치 집행잔액을 다른 스마트 관망 관리 인프라 구축으로 변경

(단위 : 백만원)

사업명	구 분	합계	2020	2021	2022	2023	2024
합 계		66,493	8,360	14,723	18,389	12,013	13,008
소 계(100%)		60,586	8,360	12,080	15,125	12,013	13,008
노후상수도정비 사업	국 비(50%)	30,293	5,016	6,040	7,562	6,007	5,668
	도 비(10%)	6,058	836	1,208	1,512	1,201	1,301
	시 비(40%)	24,235	2,508	4,832	6,051	4,805	6,039
소 계(100%)		5,907	-	2,643	3,264	-	-
스마트 관망관리 인프라구축	국 비(70%)	4,135	-	1,850	2,285	-	-
	시 비(30%)	1,772	-	793	979	-	-

◦ 사업내용

▸노후상수도 정비사업

- 노후관교체(L=70.9km) 및 블록시스템구축(53개소), 누수탐사및복구(189.3km), 가압장 설치(2개소), 유지관리 시스템 구축 1식

▸스마트 관망관리 인프라 구축

- 정밀여과장치(17개소), 자동수질 측정장치(5개소), 소규모유량수압 감시(21개소)등

□ 추 진 계 획

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역 추진	: 용역 중지 중(2022.11.7.)

- 블록 구축·고립 보완(′22.11.7 ~ 블록 구축 시설공사 완료 시까지)

▸블록시스템 구축공사 및 관망 정비공사 추진	: 2023. 1. ~ 2024. 12.

- 블록 구축 53개소, 노후관 교체(70.9km) 등

▸현대화사업 유지 관리 시스템 구축 추진	: 2023. 1. ~ 2024. 12.

- 통합운영센터(관망 감시 및 관리시스템 등) 구축(용역비 68억, 용역기간 30개월)

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸추가분(2차) 공사 추진	: 2023. 1. ~ 12.

- 기술별 추가분(소규모유량감시 8개소, 자동드레인 14개소, 정밀여과장치 14개소 등)

□ 기 대 효 과

◦ 노후 상수관망 현대화 시설 구축으로 유수율 제고 및 맑은 물 공급

◦ 실시간 수질·수량 사고 감시 및 수질 이상시 오염수 자동배출 등 신속 대응

2		상수도 지하시설물 지반탐사 용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 용 역 비 : 57백만원

◦ 용역내용

▸직경 500mm 이상의 상수도관 매설 지반에 대하여 지표투과레이더(GPR) 탐사를 통한 공동(空洞)구 조사 (L=28.5km)

◦ 관계법령

▸「지하안전관리에 관한 특별법」제34조 및 같은 법 시행규칙 제16조

- 직경 500mm 이상의 지하시설물을 대상으로 매 5년마다 1회 이상의 공동(空洞)조사를 통한 안전 점검 시행

□ 추 진 계 획

◦ 지하시설물 안전관리 업무협정(MOU) 체결

▸도-시․군-관계기관 간의 업무협정 체결	: 2023. 03.

◦ 상수도 지하시설물 지반탐사 용역 추진

▸용역 발주 및 및 착수	: 2023. 03. ~ 04.

▸용역 준공 및 보고서 작성	: 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 상수도관 매설 지반에 대한 사전 조사를 통하여 지속적인 지하 시설물 이용에 신뢰 확보

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 산 33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ～ 2024. 12.(4개년)

◦ 사업내용 : 금마배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

◦ 총사업비 : 8,010백만원(균특이양 70, 시비 30)

(단위 : 백만원)

구 분	합계	2021	2022	2023	2024	비고
합 계(100%)	8,010	714	1,086	1,420	4,790
균 특(70%)	5,613	500	760	1,000	3,353
시 비(30%)	2,397	214	326	420	1,437

□ 추 진 실 적

◦ 공 정 율 : 30%

구 분	사업비(단위:백만원)				공 종	공사내용
	합 계	도 급	관 급	폐기물
전체분	6,347	3,483	2,776	88
1 차 분	2,681	1,720	909	52	토목, 건축, 기계	토공, 기존구조물철거, 배수지구체공, 옹벽공
2 차 분	3,666	1,763	1,867	36	토목, 건축, 기계, 전기	배관공, 포장공, 가압펌프설치, 전기 및 계측제어

▸1차분 공사 착공	: 2022. 10.

- 공사기간 : 2022. 10. 25 ~ 2023. 6. 24

- 도 급 자 : ㈜ 부일건설

□ 추 진 계 획

◦ 금마배수지 확충공사 1차분 준공(토공, 옹벽공 및 구조물 시공)  : 2023. 6.

◦ 금마배수지 확충공사 2차분 착공 및 준공(배관공, 가압펌프설치등) : 2023. 7. ~ 2024. 12

□ 기 대 효 과

◦ 북부권 용수 수요 증가에 따른 배수지 체류시간 확보 및 생활용수 안정공급

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			2,640
급수구역 확장공사	춘포면 갈전마을외 3개소	배수관부설 L=3,970m	1,090
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	45개소, 9.5km	600
급·배수관 개선공사	익산시 일원	475개소	950

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장공사	: 2023. 1. ~ 11.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~11월)

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사	: 2023. 1. ~ 11.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~11월)

◦ 급․배수관 개선공사	: 2023. 1. ~ 12.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

□ 기 대 효 과

◦ 급 □ 배수관 신설 및 확장으로 수돗물 공급 최적화

◦ 상수도 부설 후 노면 불량 도로의 개선으로 안전사고 예방

5		상수도 요금 부과 ․ 징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 소요예산 : 762백만원(조사원 관리 638, 전산실 운영 124)

◦ 2023년도 부과․징수예정액 : 28,955백만원

(단위:백만원, ‘22. 12. 기준)

합계(A+B)	현년도 부과예정액(A)	과년도 체납액(B)	비고
28,955	27,984	971	2022년 체납액 : 243 2021년 이전 체납액 : 728

※ 급수전수 : 64,312전(가정용 48,434전, 일반용 14,959전, 대중탕용 40전, 산업용 780전, 전용공업용 99전)

□ 추 진 계 획

◦ 정확한 사용량 부과·징수

▸검침업무 전문화를 위한 계량기 조사원 직무교육 실시(조사원 31명)	: 월1회

▸계량기 조사원 담당구역 상수도 요금 징수 책임제 시행

▸고장 및 노후 등 계량기 신속 교체

◦ 상수도요금 징수율 제고

▸상수도 체납사용료 고액 상습 체납자 징수반 편성․운영	: 2개반

▸30만원 이상, 3회이상 체납자에 대한 강력한 체납 징수	: 수시

- 전화․방문 납부독려와 단수, 부동산 및 자동차에 대한 재산 압류

▸자동이체, 가상계좌, 신용카드 등 다양한 납부제도 운영홍보

◦ 상수도 요금 체계 개선 및 현실화 추진

▸상수도 요금 인상 추진	: 2023. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 정확한 사용량 조사 및 요금 부과로 신뢰받는 상수 행정 구현

◦ 강력한 징수 활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

6		깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 운영

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업대상 : 11개소(정수장 2, 배수지 7, 가압장 2)

◦ 사 업 비 : 647백만원

◦ 사업내용

▸배수지‧침전지 및 여과지 청소	: 8건 / 139백만원

▸신흥정수장 여과지 이중문 설치공사	: 1건 /  20백만원

▸정수시설물 정밀점검 용역	: 1건 /  57백만원

▸정수시설물 건축설비 유지보수	: 5건 / 196백만원

▸정수시설물 전기설비 유지보수	: 2건 /  55백만원

▸정수시설물 기계설비 유지보수	: 3건 / 100백만원

▸상수도 정·배수지 예초작업	: 4건 /  80백만원

□ 추 진 계 획

◦ 현장조사 및 설계	: 2023. 1. ~  3.

◦ 발주 및 착공	: 2023. 2. ~  5.

◦ 공사준공	: 2023. 3. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 정수시설물의 정기적 보수·보강으로 안전사고 미연 방지

◦ 체계적인 시설물 개량으로 고품질 수돗물의 안정적인 공급

7		신흥정수장 차염설비 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 신흥정수장 염소소독동

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 10.

◦ 사 업 비 : 550백만원

◦ 사업대상 : 신흥정수장 소독설비

◦ 사업내용

▸차염(차아염소산나트륨) 설비 1식

□ 추 진 계 획

◦ 자료수집 및 현장조사 실시	: 2023. 1.

◦ 대체소독설비 실시설계	: 2023. 1.

◦ 발주 및 착공	: 2023. 3.

◦ 대체소독설비 시험운영	: 2023. 9. ~ 10.

◦ 준공 및 정상운영	: 2023. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 신흥정수장 주변 대규모 주거지 밀집 지역에 대한 독성가스 누출 불안감 해소

◦ 고품질 수돗물에 대한 시민 요구 증대 및 안전성 확보

◦ 화학물질관리법 개정에 따른 제약과 관리 어려움 해소

8		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 향상를 위한 주민 홍보 강화

□ 추 진 계 획

◦ 원․정수 목표 수질 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정 수질검사 기준	자체 수질검사 계획
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 10개 분 기 : 질산성질소 등 42개 반 기 : 바이러스 등 3개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 월 간 : 수소이온농도 등 11개 분 기 : 질산성질소 등 42개 반 기 : 바이러스 등 3개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시	: 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 신흥․금강정수장 노후 수질자동측정기 교체 실시    : 20,000천원(2대)

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부	: 10,000천원 (50,000부)

◦ 수질검사결과 홍보강화	: 홈페이지 및 관내 관공서 등

□ 기 대 효 과

◦ 원‧정수에 대한 철저한 수질관리로 시민이 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보