2023. 1.

제249회 익산시의회(임시회)

2023 주요업무 계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 주 요 성 과 및 반 성
□	2023 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	6	6	6	5
현 원	24	1	8	7	3	5
증 감			2	1	△3

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사
◦	하수운영 :	공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2022. 12.	비 고
시설	총인구	천명	282
	하수인구	천명	270
	보급률	%	95.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	119,381
	1일평균하수처리량	톤	116,090
	하수처리율	%	97.2
하수도 사용	개소수	전	40,458
	톤당 평균요금	원	680.38

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	준공일자	비 고
계	30	150,110㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	1995.07	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	2004.09	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	2008.06	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	2008.06	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	2009.12	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	2010.05	민간위탁 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	22	1,760㎥/일	1995~2017	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	2014.07	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	2019.12	〃

2022 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율 개선

▸남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 완료

- 관로정비 29.6km, 배수설비 2,288개소

‣남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 추진(공정률 13.7%)

- 관로정비 1.9km, 배수설비 718개소

‣북부1처리분구 하수관로 정비사업 발주

- 재원협의 완료(2022.06.23.) / 계약심의위원회 심의 완료(2022.06.30.)

- 1차분 공사 조달 발주 의뢰(2022.11.25.)

‣황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 추진

- 오수신설 0.57km, 배수설비 33개소, 맨홀펌프장 1개소

‣하수시설 민원처리 배수설비 설치공사 41건 처리 완료

◦ 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 완료

‣기존 소화조 개량(10,000㎥/일) 및 소화조 증설(6,692㎥/일)

‣협작물처리기, 농축시설 및 저류조 운영방식 개선 및 반류수처리시설 설치

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣환경기초시설 악취개선사업 실시설계용역시행을 통한 악취 저감 추진

‣수질측정기기 TOC교체 등 기능보강공사 추진으로 방류 수질 관리 철저

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣소규모 공사 154건 처리 및 생활민원처리 268건 처리

‣생활민원 처리를 위한 비상근무조 운영 : 2,659건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 추진 중 재원협의 등 행정절차 지연으로 착공 지연

‣환경부 재원 협의 완료되어 2022. 12월 착공 완료

		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 함열읍 와리 우수박스 설치공사 장점 소규모하수처리시설 신설 상갈 소규모하수처리시설 신설 환경기초시설 악취개선 사업 공공하수처리시설 운영관리(BTO) 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 영등지구 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

2023 주요업무계획

1		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구, 맨홀펌프장 9개소, 자가펌프장 11개소

◦ 총사업비 : 37,386백만원(국비  13,559 도비 2,382 시비  21,445)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020이전	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	37,386	1,321	2,604	6,374	3,976	23,111
국비( 36%)	13,559	642	1,366	4,655	1,961	4,935
도비( 6%)	2,382	64	136	465	345	1,372
시비( 58%)	21,445	615	1,102	1,254	1,670	16,804

□ 추 진 실 적

◦ 1차분 공사 시행	: 2021. 09. ~ 2022. 11.

▸오수관로 L=444m, 굴착교체 L=297m, 개인배수설비 설치 366개소

◦ 2차분 공사 착공	: 2022. 07.

▸오수관로 L=308m, 굴착교체 L=890m, 개인배수설비 설치 218개소

※ 전체 공정률 : 13.7% (관로 1.9㎞, 배수설비 718개소)

□ 추 진 계 획

◦ 2차분 공사 추진	: 2022. 07. ~ 2023. 07.

◦ 3차분 공사 추진	: 2023. 07.

※ 장기 계속사업으로 2024. 12월 준공 예정

□ 기 대 효 과

◦ 분류식 하수관로 정비를 통해 남부지역 하수관로 통수능력을 개선하여 분뇨처리 비용 절감 및 도시미관 개선

2		북부1처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 02. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=28.4km, 배수설비 1,363가구

◦ 총사업비 : 44,242백만원(국비 24,851 도비 1,939 시비 17,452)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	44,242	714	1,153	2,019	2,725	37,631
국비( 56%)	24,851	500	1,010	1,411	2,503	19,427
도비( 4%)	1,939	21	43	60	107	1,708
시비( 40%)	17,452	193	100	548	115	16,496

□ 추 진 실 적

◦ 재원협의 완료	: 2022. 06.

◦ 계약심의위원회 및 도로관리심의회 심의 완료	: 2022. 06. ~ 09.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2022. 11.

◦ 1차분 공사 조달 발주 의뢰	: 2022. 11.

□ 추 진 계 획

◦ 1차분 공사 추진	: 2023. 02. ~ 2023. 12.

※ 장기 계속사업으로 2024. 12월 준공 예정

□ 기 대 효 과

◦ 시내일원 오·우수 분류식 하수관로 정비를 통한 개인정화조 등에서 발생되는 악취발생 원인 제거 및 만경강수계 수질개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성

3		함열읍 와리 우수박스 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열읍 와리 315번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 우수박스 신설 1.5×1.5 L=430m

◦ 총사업비 : 1,200백만원(시비)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계용역 발주	: 2023. 01.

◦ 실시설계용역 착수 및 준공	: 2023. 02. ~ 12.

◦ 공사 착공 및 준공	: 2024. 01. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 우수박스 신설 및 연계처리로 인근 마을(장구, 금성)의 근본적 침수 피해 해소 및 안전사고 예방

4		장점 소규모하수처리시설 신설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함라면 신등리 일원(장점, 왈인, 장고재, 장등, 진산, 망월, 회룡마을)

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 신설 65㎥/일

◦ 총사업비 : 7,538백만원(국비  4,523 도비 1,507 시비  1,508)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	7,538	400	2,915	4,223
국비( 60%)	4,523	300	1,689	2,534
도비( 20%)	1,507	100	563	844
시비( 20%)	1,508	0	663	845

□ 추 진 계 획

◦ 기본 및 실시설계용역 발주	: 2023. 01.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 및 준공	: 2023. 02. ~ 12.

◦ 공사 착공 및 준공	: 2024. 01. ~ 2025. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 함라면 신등리 일대 7개마을(장점, 왈인, 장고재, 장등, 진산, 망월, 회룡마을) 하수처리구역 확대에 따른 소규모 공공하수처리시설 신설로 효율적인 하수처리 및 주거환경 개선

5		상갈 소규모하수처리시설 신설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 삼기면 서두리 일원(상갈, 하갈, 신평, 화초, 원서두마을)

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 신설 60㎥/일

◦ 총사업비 : 5,018백만원(국비  3,011 도비 1,003 시비  1,004)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	5,018	400	1,906	2,712
국비( 60%)	3,011	300	1,084	1,627
도비( 20%)	1,003	100	361	542
시비( 20%)	1,004	0	461	543

□ 추 진 계 획

◦ 기본 및 실시설계용역 발주	: 2023. 01.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수 및 준공	: 2023. 02. ~ 12.

◦ 공사 착공 및 준공	: 2024. 01. ~ 2025. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 삼기면 일대 개발 여건 변화 및 하수처리구역 확대에 따른 공공하수처리시설 신설로 오염원 정화 및 주거환경 개선

6		환경기초시설 악취개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 총 8개소(익산·분뇨·북부·함열·금마·여산하수,1·2중계펌프장)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 악취방지시설 신규 설치 및 용량 재구성 등

◦ 총사업비 : 7,995백만원(국비 4,320 도비 1,838 시비 1,837)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	7,995	667	1,096	6,232
국비( 54%)	4,320	500	755	3,065
도비( 23%)	1,838	167	326	1,345
시비( 23%)	1,837	0	15	1,822

□ 추 진 실 적

◦ 북부·금마·함열·여산공공하수 악취기술진단 실시 : 2020. 02. ~ 2020. 06.

◦ 익산·분뇨처리시설 악취기술진단 실시          : 2020. 10. ~ 2020. 12.

◦ 실시설계 용역 착수                          : 2022. 06.

□ 추 진 계 획

◦ 행정절차 이행(재원협의 등)                   : 2023. 02.

◦ 실시설계 용역 준공                          : 2023. 02.

◦ 환경기초시설 악취개선사업 시행               : 2023. 03.

□ 기 대 효 과

◦ 악취저감시설 설치로 공기 중 악취확산을 최소화함으로써 강화되는 악취 배출허용기준에 대응하고, 악취발생을 근원적으로 제거함으로써 주거 생활환경 개선

7		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소, 중계펌프장 17개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

※ 2023년 BTO위탁운영비: 16,590백만원(도비 590 시비 16,000)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 법정검사 기준 준수	: 연중

▸방류수수질기준 준수(6개 항목), 복합악취농도 기준 준수(분기별)

◦ 함열하수 공기압축기 보수 외 26건 보수 및 개선 실시	: 2022. 01. ~ 12.

□ 추 진 계 획

◦ 익산 외 4개소 공공하수처리시설 수질관리(6개항목, 일1회)	: 연중

◦ 익산 외 3개소 정기 점검(환경청)	: 연중

◦ 하수찌꺼기 성분 검사(연 2회)	: 상·하반기

◦ 공공하수처리시설 4개소 분기별 복합악취농도 검사	: 분기별

◦ 공공하수처리시설 4개소 운영관리 실태평가(환경청)	: 2023. 05. ~ 06.

□ 기 대 효 과

◦ 하수처리 기술과 노하우를 가진 전문 업체의 위탁운영으로 방류수 수질기준을 철저히 준수하고, 시민이 체감하는 양질의 하수도 서비스 제공

8		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 25개소(여산 1, 소규모 22, 제3산업단지 1, 국가식품클러스터 1)

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,760	105개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), (유)일토씨엔엠 2023. 01. ~ 2025. 08.]

※ 2023년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비: 3,209백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 삼기간촌 외 4개 하수처리장 기술진단 완료	: 2022. 02. ~ 07.

◦ 국가식품 흡입배관 보수 외 19개 보수공사 완료	: 2022. 01. ~ 12.

◦ 신규 관리대행업자 선정완료(기술ˑ가격 분리입찰)	: 2022. 07. ~ 12.

□ 추 진 계 획

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리

▸공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 운영(주 4~5회 수시점검)

▸처리시설 용량별 수질검사 6개 항목

- 500톤/일 이상 3개소 일 1회, 50~500톤/일 12개소 주 1회, 50톤/일 미만 10개소 월 1회 수질검사

◦ 제3산단 및 국가식품폐수 운영관리 실태평가	: 2023. 07.

◦ 제3산단 및 국가식품폐수, 여산하수 복합악취측정	: 분기별

□ 기 대 효 과

◦ 관리대행 업체에 위탁운영 함으로써 전문적인 운영관리 및 시설의 효율적 운영․방류수질 기준 확보

9		익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.63km

※ 평화동(1,250m), 송학동(910m), 모현동(470m)

◦ 총사업비 : 12,109백만원(국비 6,054 도비 605 시비 5,450)

※ 2023년 사업비: 995백만원(국비 902 도비 90 시비 3(미확보 809))

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022년	2023	2024	비고
합계(100%)	12,109	1,220	1,145	995	8,749
국비( 50%)	6,054	500	1,041	902	3,611
도비( 5%)	605	50	104	90	361
시비( 45%)	5,450	670		3	4,777

□ 추 진 실 적

◦ 2021년 국고보조사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

◦ 사업추진 공법 결정(비굴착 전체보수, 부분보수 등)	: 2022. 11.

□ 추 진 계 획

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2023. 01.

◦ 공사 착수 및 완료	: 23. 05. ~  24. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 노후 우수박스정비를 통해 하수배제 기능을 개선하고, 침수피해·싱크홀 등의 안전사고 예방

10		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 13,555백만원(국비 6,394 도비 640 시비6,521)

※ 2023년 사업비: 1,235백만원(국비 742 도비 74 시비 419(미확보 249))

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	13,555	1,190	1,215	1,235	9,915
국비( 50%)	6,394	500	851	742	4,301
도비( 5%)	640	50	85	74	431
시비( 45%)	6,521	640	279	419	5,183

□ 추 진 실 적

◦ 국가산업단지 하수관로 기술진단 실시	: 2019. 04.

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2022. 07.

◦ 공사발주	: 2022. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 공사 착수 및 완료	: 2022. 12. ~ 2024. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 40년 이상 경과한 국가산업단지 내 노후하수관로 교체·보수를 통해 지하수 오염, 침수피해 및 지반침하 등의 안전사고를 예방하고, 하수배제 기능을 개선하여 공공하수처리시설의 효율성 향상

11		영등지구 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동(5,854m), 마동(1,060m), 남중동(286m) 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 노후하수관로정비 L=7.2km

◦ 총사업비 : 6,306백만원(국비 3,153 도비 315 시비 2,838)

※ 2023년 사업비: 550백만원(국비 500 도비 50 시비 미확보(450))

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022이전	2023	2024	비고
합계(100%)	6,306	550	1,078	4,678
국비( 50%)	3,153	500	1,034	1,619
도비( 5%)	315	50	44	221
시비( 45%)	2,838	0	0	2,838

□ 추 진 실 적

◦ 2022년 환경부 신규 국고보조사업 확정	: 2021. 10.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 05.

□ 추 진 계 획

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2023. 02.

◦ 공사착수	: 2023. 05.

□ 기 대 효 과

◦ 영등제2택지지구, 마동, 남중동 일원의 노후하수관로 정비를 통해 하수배제 기능을 개선하고, 침수피해·싱크홀 등의 안전사고 예방

12		소규모 하수도 시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 1,163백만원 (시비)

◦ 사업내용

▸소규모 하수도시설 정비공사	: 15건 / 500백만원

▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 25건 / 263백만원

- 함열읍 하시하마을 하수도 정비공사 외 24건

▸하수관로 기계준설	: 12건 / 400백만원

□ 추 진 계 획

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸상반기 공사 발주 10건/350백만원	: 2023. 01. ~ 2023. 06.

▸하반기 공사 발주 5건/150백만원	: 2023. 07. ~ 2023. 12.

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)

▸상반기 공사 완료(예정) 25건/263백만원	: 2023. 01. ~ 2023. 06.

◦ 하수관로 기계준설

▸상반기 공사 발주 7건/250백만원	: 2023. 01. ~ 2023. 06.

▸하반기 공사 발주 5건/150백만원	: 2023. 07. ~ 2023. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 슬러지 적체, 배수불량 등 하수의 흐름을 방해하는 요소를 사전에 제거하고, 시민 맞춤형 소규모 생활환경개선사업을 통하여 쾌적한 정주여건 조성