2023. 1.

제249회 익산시의회(임시회)

2023 주요업무 계획

	기획안전국

시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2022 주 요 성 과
□	2023 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 안전 및 보건에 관한 체계적인 관리시스템 구축으로 중대재해예방 재해위험 및 취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보

일   반   현   황

□ 기      구

								시민안전과
안전총괄				자연재난					중대재해				방재시설			민 방 위

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	5	6	5	5
현 원	24		1	6	5	5	7
증 감	2		-	1	△1	- (시간선택제 임기제라급 2)	2

□ 사 무 분 장

◦ 안전총괄 : 안전관리계획 총괄, 안전문화교육, 시민안전보험, 안전신문고, 재난관리기금, 재난안전상황실, 안전관련 민관 협력계구축, 재난안전통합지원본부(사회재난), 안전한국훈련, 유‧도선사업, 승강기 관리, 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설 관련 등

◦ 자연재난 : 재난안전통합지원본부 운영(자연재난), 배수펌프장 및 배수문 유지관리, 가뭄‧한파‧폭염 종합대책, 자연재난 사전대비, 예‧경보시설, 그늘막 관리 등

◦ 중대재해 : 중대재해예방 종합계획 수립, 매뉴얼 작성·운영, 관련법령상 이행조치 관리, 산업안전보건 관리체계 구축

◦ 방재시설 : 사전재해영향성 검토, 우수저류시설 사업, 재해예방·복구, 자연재해위험지구 정비, 급경사지 관리, 소규모 위험시설 취합

◦ 민 방 위 : 국가기반체계 보호 및 비상대비훈련, 충무계획, 민방위 시설·장비 관리, 통합방위협의회, 민방위 기본계획, 사회복무요원 관리

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

구 분	구 성	구 분	구 성
계	5개 73명
안전관리 위원회	15 ▸공무원 6 ▸군 인 2 ▸공 사 4 ▸기업인 3	재난관리기금 운용심의위원회	9 ▸공무원 4 ▸시의원 1 ▸전문가 2 ▸교 수 2
안전관리민관 협력위원회	19 ▸공무원 7 ▸시의원 1 ▸공 사 1 ▸교 수 2 ▸기업인 3 ▸민간인 5	재해영향평가 위원회	20 ▸공무원 3 ▸교 수 5 ▸전문가 12
산업안전보건 위원회	10 ▸공무원 5 ▸공무직 5

□ 방재시설 및 재해취약시설(지구) 현황

구 분	계	배 수 펌프장	수 문	게이트 펌 프	대규모 공사장	산사태	인명피해 우려지역
개소	78	9	11	1	10	30	17

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	18개소	-	102개소	6개소	38개소	15,425점

2022 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2022년 재난관리평가 최우수기관 선정 (전국 226개 시군구 중 1위)

◦ 2022년 대한민국 안전대전환 집중안전점검 최우수기관 선정 (전북도 1위)

◦ 예방중심의 안전관리로 재난 없는 도시 도성

‣익산시민 안전보험 가입	: 15개 항목 109백만원(지방재정공제회)

‣초·중·고 맞춤형 안전교육	: 29개 학교 38회 2,886명

◦ 코로나19 대응 추진으로 감염병 확산 방지 및 대시민 지원

‣코로나19 대응 익산시 재난안전대책본부 운영 및 사회적 거리두기 시행

‣자가격리자 구호물품 및 방역물품 지급	: 22,350세트(건)

‣행정명령 이행시설 재난지원금 및 사각지대 재난지원금 지급	: 9,650개소

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 실시로 재난 예방

‣상반기 정기안전점검 19개소 / 하반기 정기안전점검 9개소 완료

‣정밀안전점검 10개소 완료

◦ 재해위험·취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화

‣인화지구 우수저류시설 설치공사 추진	: 공정률 90%

‣재해위험개선지구 정비사업 추진     : 4개소(석천대, 석탄, 여산, 판문)

‣급경사지 정비사업 추진                : 4개소(송천, 성당, 아리랑, 용두산)

‣자연재해저감 종합계획 재수립용역 추진

□ 반      성

◦ 재해위험·취약지역정비 사업 지연

‣최근 추진중인 장기계속사업이 실시설계용역 단계로서 예산 집행률이 저조하나, 석탄지구 등 3개 사업이 공사 발주 및 착공한 상황으로 사업이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기하겠음

		시민과 함께하는 안전문화 확산 안전사고 예방을 위한 안전관리 강화 자연재해 최소화를 위한 선제적 대응 재해예방 시설물 유지관리 및 보수보강 중대재해예방 및 관리체계 구축 인화지구 우수저류시설 설치공사 석탄 재해위험개선지구 정비사업 여산 재해위험개선지구 정비사업 판문 재해위험개선지구 정비사업 급경사지 정비사업 국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

2023 주요업무계획

1		시민과 함께하는 안전문화 확산

□ 추 진 배 경

◦ 안전교육 및 문화 확산으로 일상생활 속 시민안전 인식 제고 필요

◦ 재난·재해 대비 및 대응역량 강화 필요

※ 2022년 사회 안전에 대한 인식률(전반적인 사회안전, 통계청) : 안전 33%, 보통 45%, 불안 22%

□ 추 진 계 획

◦ 안전점검의 날 안전문화 캠페인 실시	: ’23. 3. ~ 12.

▸시기⸱계절별 테마*에 맞게 매월 1회(총10회) 점검 추진

* 개학기 학교주변, 행락철 안전사고, 여름⸱겨울철 자연재해 등

▸안전관련 민간단체(자율방재단, 민간예찰단 등) 합동 추진

◦ 생활안전사고 예방 초‧중‧고 맞춤형 안전교육 실시	: ’23. 5.

▸VR체험 등을 활용한 실습형 안전교육 추진 (전기, 가스, 교통, 심폐소생술)

◦ 익산시 시민안전보험 확대 갱신 가입 및 홍보	: ’23. 2.

▸‘야생동물사망 및 후유장해’ 등 최근 관내 벌 쏘임 사망사건 반영

◦ 화재 예방 및 피해주민 지원	: 상  시

▸화재대피용 방연마스크 구입 및 비치 (어린이집, 요양병원 등)

▸소방취약계층 주택용 소방시설(단독경보형감지기, 소화기)지원 (장애인, 독거노인 등)

▸화재로 인한 거주 주택 피해 시 피해지원금 지급 (화재증명원 기준)

※ 화재피해가 경미하거나 화재보험에 가입된 주택 등은 지원 제외

◦ 재난대응 안전한국훈련 실시	: ’23. 하반기

▸실전과 같은 통합훈련 실시로 재난대응 역량 강화(토론⸱현장 기반)

□ 기 대 효 과

◦ 재난대비 훈련, 안전교육 실시 및 안전문화 캠페인 활동으로 시민들의 재난⸱재해 대비 대응역량을 강화하고 생활 속 안전의식 고취

2		안전사고 예방을 위한 안전관리 강화

□ 추 진 배 경

◦ 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전 예방 필요

◦ 생활 주변 안전관리 강화로 각종 안전 위해요소 제거 필요

□ 추 진 계 획

◦ 안전관리 종합계획 수립	: ’23. 1. ~ 2.

▸국가안전관리 기본계획을 바탕으로 시 특성에 맞는 계획 수립

◦ 안전한 도시만들기를 위해 집중안전점검 및 특별점검 추진     : ’23. 1. ~ 12.

▸명절대비 다중이용시설 점검 (역, 터미널, 전통시장 등)

▸‘22년 집중안전점검 : 총 92개소 점검 (현지시정 10개소, 보수·보강 16개소)

◦ 시설물안전관리법 대상 시설물 관리	: ’23. 1. ~ 12.

▸제3종시설물 실태조사 실시 (‘23년도 대상 : 총 165개소)

▸각 시설물 상·하반기 정기·정밀안전점검 실시 여부 확인

◦ 발주공사·수행사업 안전관리 산재예방활동 추진	: ’23. 1. ~ 12.

▸합동평가·발주공사 안전점검계획 수립 및 이행 여부 확인

◦ 지역축제 및 옥외행사 안전관리 강화 추진	: ’23. 1. ~12.

* 위 대상에 대하여는 안전관리자문단 등을 통한 1일 전 현장점검 실시

안전관리계획 수립	•순간 최대 인원 1천명 이상 또는 고위험(불, 폭죽, 가스 등) 축제·행사 •순간 최대 인원 5백명 이상 1천명 미만의 옥외행사
안전관리위원회 심의	•순간 최대 인원 1천명 이상 또는 고위험(불, 폭죽, 가스 등) 축제·행사 •3천명 이상의 관람이 예상되는 공연, 행사

◦ 신속한 상황판단 후 재난안전대책본부 즉시 운영 태세 확립    : 재난발생시

▸재난안전통신망 운영을 통한 협업부서 및 경찰, 소방, 군부대 등

유관기관 간 상시 재난 협력체계 구축

▸재난발생 위기경보 단계별* 신속 조치 : AI, 코로나19 대응 추진 등

* 관심→주의(재난수습부서)→경계(상황판단 회의)→심각(재대본 가동)

□ 기 대 효 과

◦ 각종 안전관리 계획 수립, 시설물 점검, 산재예방활동 추진, 축제 관리 강화 등으로 사회재난으로부터 시민의 생명과 재산 보호

3		자연재해 최소화를 위한 선제적 대응

□ 사 업 개 요

◦ (재난대응) 여름철, 겨울철 재난상황 대응계획 수립 및 시행

▸여름철 : 사전대비  2. 20. ~  5. 14. 재해 대책기간  5. 15. ~      10. 15. (5개월)

▸겨울철 : 사전대비 10. 1. ~ 11. 14. 재해 대책기간 11. 15. ~ 익년 3. 15. (4개월)

◦ (시설보강) 자연재해 예방시설 보강사업 820백만원(도비 410, 시비 410)

▸자동음성통보시스템 보강사업	: 300백만원(도비 150, 시비 150)

▸강우량계 및 적설계 보강사업	: 320백만원(도비 160, 시비 160)

▸배수펌프장 및 배수문 보수·보강 외 2건	: 200백만원(도비 100, 시비 100)

□ 추 진 계 획

◦ 여름철(태풍·호우·폭염), 겨울철(대설·한파) 재난 대응/재대본 운영   : 연    중

▸재난안전대책본부 구성‧운영(13개 협업분야 15개과, 6개 유관기관)

◦ 여름철 풍수해 자연재난 대비 대응계획 수립 및 사전점검	: ’23. 3. ~ 5.

◦ 집중호우 대비 인명피해 우려지역(17개소) 전수점검	: ’23. 3. ~ 5.

◦ 재해예방시설 점검 및 가동훈련	: ’23. 3. ~ 5.

▸배수펌프장 9개소, 수문 12개소, 우수저류시설 3개소

◦ 폭염 종합대책 수립 및 추진	: ’23. 5. ~ 9.

▸폭염 T/F팀 운영, 다중이용시설 얼음·생수 비치, 노면 살수차 운행

▸무더위쉼터 점검 및 운영, 취약계층 및 재난도우미 DB 구축

◦ 겨울철 풍수해 자연재난 대비 대응계획 수립 및 사전점검	: ’23. 10. ~ 11.

□ 기 대 효 과

◦ 재난 관련 부서들의 철저한 협업체계 구축, 시설물 점검, 대응훈련 등을 통해 재난 발생 시 신속한 대응과 복구를 시행하여 자연 재난으로부터 시민의 생명과 재산 보호

4		재해예방 시설물 유지관리 및 보수보강

□ 사 업 개 요

계	배수 펌프장	배수문	우수 저류시설	예·경보 시스템	기상관측 장비	재대본 홈페이지	재해문자 전광판
210	9	12	3	141	42	1	2

◦ 재난예방 시설물 현황                              (단위 : 개소)

◦ 총사업비 : 297백만원

◦ 주요 추진사항

▸배수펌프장 및 배수문 정기·정밀 안전점검 용역

▸시설물 점검에 따른 결함, 노후 장비 보수·보강

▸재난 예·경보 시설 및 기상 관측장비(홈페이지) 유지관리 용역

□ 추 진 계 획

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역

▸정기안전점검(상반기 19개소, 하반기 10개소)	: ‘23. 1. ~ 12.

▸정밀안전점검(9개소)	: ’23. 3. ~  9.

◦ 재난재해예방 시설물 유지관리 용역

▸조기경보시스템 유지관리 용역계약	: ‘23. 1. ~ 12.

▸펌프장, 기상관측 CCTV 유지관리 용역계약	: ’23. 1. ~ 12.

▸강우량계, 적설계, 홈페이지 유지관리 용역계약	: ‘23. 1. ~ 12.

◦ 시설물 점검에 따른 결함, 노후장비 보수·보강	: 상   시

□ 기 대 효 과

◦ 시설물의 정상가동을 위한 최적의 상태 유지를 통해 자연재해로부터 피해 최소화

5		중대재해예방 및 관리체계 구축

□ 사 업 개 요

◦ 중대재해예방을 위한 분야별 중대산업·시민재해 안전·보건 체계 구축으로 종사자와 시민 보호

◦ 사 업 비 : 158,755천원(시비)

◦ 적용대상

▸중대산업재해 : 시 산하 전직원(약 2,800명) 및 도급·용역·위탁사업 종사자

▸중대시민재해 : 공중이용시설 90개소 (시설물안전리법, 실내공기질관리법 등)

◦ 주요사업

▸중대재해 컨설팅용역, 작업환경 측정, 근골격계유해요인조사, 위험성평가 등

□ 추 진 계 획

◦ ‘23년 중대재해예방 안전계획 수립	: ’23. 1. ~ 2.

▸중대재해 예방 안전계획 수립으로 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호

◦ 중대재해처벌법 대응 컨설팅 용역	: ’23. 1. ~ 2.

▸안전·보건 확보의무 이행체계 점검 및 지도

◦ 안전·보건 관리 위탁	: 연  중

▸안전·보건관리자 업무 지원 및 산업보건의 업무 수행

◦ 관리감독자 정기교육(연16시간) 및 전직원교육(연2회)	: 연  중

▸법령의 이해도를 높이고 안전역량을 강화

◦ 작업환경측정(연2회) 및 근골격계 유해요인조사(연1회)	: 연  중

▸사업장 내 잠재 유해·위험요인 조사 및 작업환경 개선

◦ 사업장 순회점검 및 위험성평가(연1회)	: 연  중

▸사업장 내 잠재 유해·위험 요소 선제적 발굴 및 제거

◦ 중대재해긴급대응	: 연  중

▸중대재해 발생 시 용품 배부 및 지원

◦ 중대재해예방 의무이행사항 점검	: 반기별

◦ 산업안전보건위원회 개최	: 매분기

□ 기 대 효 과

◦ 사업장 수시점검 및 안전교육 실시 등으로 재해 예방 대응역량을 강화하고 위험요소 발굴 및 제거, 재해예방으로 종사자와 시민 보호

6		인화지구 우수저류시설 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 주현동 203번지(1지구), 동산동 1048번지(2지구)

◦ 사업규모 : 우수저류시설 설치 18,920㎥(인화1 : 8,570㎥, 인화2 : 10,350㎥)

◦ 총사업비 : 24,205백만원(국비 11,500, 도비 3,450, 시비 9,255)

▸기투자 : 23,000백만원(국비 11,500, 도비 3,450 시비 8,050)

▸‘23년도 :  1,205백만원(시비 1,205)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년(6개년)

□ 추 진 실 적

◦ 도시관리계획(마동지구단위계획) 결정(변경)	: ’19. 12.

◦ 공사 착공	: ’20.  4.

◦ 우수저류시설 설치공사 추진(공정률 90%)	: ’22. 12.

▸1지구 : 저류조 바닥 및 벽체 완료, 상부 슬라브 공사 중

▸2지구 : 저류조 완료, 건축‧기계‧전기 공사 중

□ 추 진 계 획

◦ 저류시설 공사 완료	: ’23. 2.

▸토목(저류조), 건축(기계실, 화장실), 기계(펌프), 전기(배전반)

◦ 조경공사, 유‧출입관로 설치	: ’23. 3.

◦ 우수저류시설 시운전	: ’23. 4.

◦ 시설물 준공	: ’23. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우시 인화동, 동산동 일원의 도심지 주거밀집지역의 상습 침수 방지로 재해 사전 예방

7		석탄 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 석탄동 1016-91번지 일원

◦ 사업규모 : 펌프장 증설(1개소 Q=23.5㎥/s→ 2개소 56.5㎥/s, 펌프 8대 30㎥/s 증), 관로개선 L=358m

◦ 총사업비 : 29,165백만원(균특 5,132, 국비 9,450, 도비 5,833, 시비 8,750)

▸기투자 : 18,900백만원(균특     0, 국비 9,450, 도비 3,780, 시비 5,670)

▸2023년 : 2,000백만원(균특 1,000, 국비    0, 도비  400, 시비  600)

▸2024년이후 : 8,265백만원(균특 4,132, 국비 0, 도비 1,653, 시비 2,480)

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)

□ 추 진 실 적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2019-93호)	: ’19.  9.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’20.  5.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: ’22.  7.

◦ 기술자문위원회 심의(익산시 감사위원회)	: ’22.  8.

◦ 계약심의위원회 심의(익산시 회계과)	: ’22. 10.

◦ 공사 착공	: ’22. 12.

□ 금 후 계 획

◦ 공사 추진	: ’23.  1.

▸토목(펌프장), 건축(기계실), 기계(펌프), 전기(배전반)

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 석탄동 일원 펌프장 증설을 통하여 목천포천 하류 저지대 침수피해 예방 및 시민의 생명과 재산 보호

8		여산 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 여산리 412-4번지 일원

◦ 사업규모 : 배수로 신설 L=350m, 우수관로 정비 L=4,800m, 펌프장 Q=21.0㎥/min 및 저류지 1개소(V=3,400㎥) 설치, 강경천·닭작골천·유성천 정비

◦ 총사업비 : 38,000백만원(균특 18,000, 국비 1,000, 도비 7,600, 시비 11,400)

▸기투자 :  2,000백만원(균특     0, 국비 1,000, 도비   400, 시비   600)

▸2023년 :  3,000백만원(균특 1,500, 국비    0, 도비   600, 시비  900)

▸2024년이후 : 33,000백만원(균특 16,500, 국비 0, 도비 6,600, 시비 9,900)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5개년)

□ 추 진 실 적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호)	: ’20.  8.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’21. 12.

◦ 제1차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’22.  2.

◦ 제2차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’22.  3.

◦ 기본설계 사전설계검토(행정안전부)	: ’22. 12.

□ 금 후 계 획

◦ 제3차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’23.  1.

◦ 실시설계 사전설계검토 심의(행정안전부)	: ’23.  5.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: ’23.  7.

◦ 공사 착공	: ’23.  9.

◦ 공사 준공	: ’25. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 펌프장, 배수로, 우수관로, 하천정비 등 종합정비사업을 통하여 여산면소재지 일원 저지대 침수피해 예방 및 시민의 생명과 재산 보호

9		판문 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 춘포면 용연리 529-5번지 일원

◦ 사업규모 : 수로정비 L=411m, 암거신설(5.0x1.5) L=150m, 우수관로정비L=534m

◦ 총사업비 : 4,400백만원(균특 610, 국비 1,590, 도비 880, 시비 1,230)

▸기투자 : 3,180백만원(균특   0, 국비 1,590, 도비 636, 시비   954)

▸2023년 :   820백만원(균특 410, 국비     0, 도비 164, 시비   246)

▸2024년이후 : 400백만원(균특 200, 국비  0, 도비  80, 시비   120)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4개년)

□ 추 진 실 적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호)	: ’20.  8.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’21.  6.

◦ 사전설계검토 심의(전라북도)	: ’22.  7.

◦ 공사원가심사(전라북도)	: ’22.  8.

◦ 공사 착공(공정률 5%)	: ’22. 10.

□ 금 후 계 획

◦ 공사 추진	: ’23.  1.

▸수로정비, 저류지설치, 교량설치 공사

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 춘포면 판문마을 저지대 일원의 배수로 확장 및 설치로 침수피해 예방 및 시민의 생명과 재산 보호

10		급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 송천지구, 성당지구, 아리랑지구, 용두산지구, 기산지구

◦ 사업규모 : 사면정비 5개소(A=17,920㎡)

◦ 총사업비 : 17,418백만원(국 8,709, 도 3,484, 시 5,225)

사 업 명	총사업비(백만원)				사업기간
	소 계	기투자	2023년	2024년이후
총 계	17,418	6,060	2,758	8,600
송천지구	1,800	1,800	-	-	‘20년~’23년
성당지구	1,500	1,500	-	-	‘20년~’23년
아리랑지구	3,518	2,260	1,258	-	‘21년~’24년
용두산지구	10,000	500	1,400	8,100	‘22년~’25년
기산지구	600	-	100	500	‘23년~’25년

□ 추 진 실 적

◦ 송천지구, 성당지구, 아리랑지구 급경사지 정비사업 공사 추진

▸공사 착공(송천 ‘21.10월, 성당 ’21.12월, 아리랑 ‘22.8월)

▸공사 공정률(송천 50%, 성당 20%, 아리랑 5%)

◦ 용두산지구 급경사지 정비사업 실시설계용역 추진

▸지구 지정(’20.12월)/ 실시설계용역 착수(‘21.2월)/ 실시설계(안) 행정안전부 사전협의(’22.12월)

□ 금 후 계 획

◦ 실시설계용역 착수(기산지구)	: ’23.  2.

◦ 실시설계용역 완료 및 공사 착공(용두산지구)	: ’23.  6.

◦ 공사 준공(송천지구, 성당지구)	: ’23. 12.

◦ 계속공사 추진(아리랑지구)	: ’23. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 사면의 풍화 등으로 인한 세굴, 유실 및 낙석 발생 구간을 보수·보강하여 시민의 생명과 재산 보호

11		국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

□ 사 업 개 요

◦ 추진방향 : 비상대비‧민방위 분야 대응태세 확립으로 시민의 생명과 재산보호

◦ 주요내용

▸비상대비 분야  : 비상대비 을지연습 실시, 통합방위협의회 개최

▸민 방 위 분야  : 민방위대 편성 및 교육, 민방위 시설·장비 확충 및 관리

* 민방위대원 13,634명 (2022.12.20.기준) : 1-4년차 5,653명, 5년차 이상 7,981명

* 민방위 시설‧장비 164개소 : 경보시설 18, 대피시설 102, 급수시설 44

□ 추 진 계 획

◦ ‘23년 민방위대원 편성	: ’23. 1.

◦ 민방위 대원 교육 실시	: ’23. 3. ~ 11.

▸집합교육(4시간) : 1~2년차, 사이버교육(1~2시간) : 3년차 이상

◦ 민방위 경보시설 신규 구축(1개소)	: ’23. 4.

◦ 국가 비상대비 을지연습 실시	: ’23. 8.

◦ 익산시 통합방위협의회 개최	: 분기별

◦ 민방위 시설장비 유지관리	: 연  중

▸급수시설 관정 사후관리, 경보시설 노후 충전지 교체 등

□ 기 대 효 과

◦ 국가적 비상·재난 사태에 대비한 민방위 시설·장비의 사전점검과 실용적 민방위 교육훈련을 통한 비상대비 태세 확립