2023. 5.

제251회 익산시의회(제1차 정례회)

2023 행정사무 감사자료

	국가식품클러스터담당관

국가식품클러스터담당관

	□		감사자료 공통사항
			1.	2022년도 업무성과 및 반성																				3
			2.	2022년도 예산집행 및 추진사항																				4
			3.	2022년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과																				6
			4.	2022년도 감사시 감사 지적사항 및 조치결과																				10
			5.	5분 자유발언 조치 결과																				10
			6.	시정질문에 대한 조치 결과																				11
			7.	의원발의 조례 제·개정 후 추진현황																				11
			8.	주요사업 조서(3천만원 이상)																				12
			9.	2022년도 각종 민원 접수(진정,건의,청원 등) 처리내역																				14
			10.	기금 운용 관련사항																				14
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련																				14
			12.	용역사업 관련																				15
			13.	인․허가 민원처리 관련사항																				15
			14.	각종공사 설계변경 상황																				16
			15.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상)																				16
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역																				17
			17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)																				18
			18.	지방보조금 성과평가 내역																				19
			19.	2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역																				20
			20.	2023년도 명시이월 내역																				21

국가식품클러스터담당관

	□		감사자료 공통사항
			21.	2023년도 명시이월(의회제출) 후 2022년도 집행한 내역														21
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황														22
			23.	공사 준공기한 연장 내역														22
			24.	국‧도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산 현황														22
			25.	국‧도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)														23
			26.	2022년도 계획사업 중 미착공사업 현황														24
			27.	2022년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황														24
			28.	2022년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황														24
			29.	2022년도 예산편성 후 전액 미집행 내역														25
			30.	예산편성목과 다르게 집행된 예상 현황														25
			31.	소송 사건 현황														25
			32.	시홈페이지 접수 민원처리 실태 현황														26
			33.	시설‧사무 민간위탁 현황														26
			34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 집행 현황														27
			35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황														27
			36.	시 산하 재단 설립 현황														27
			37.	업무협약(MOU)등 체결 현황														28

국가식품클러스터담당관

	□			국가식품클러스터담당관 요구사항
			1.	국가식품클러스터 산업단지 조성(1단계)			31
			2.	국가식품클러스터 배후복합도시 조성			32
			3.	국가식품클러스터 투자유치 활동			33
			4.	기업비즈니스 지원 활성화			35
			5.	기업기술 지원			36
			6.	기능성식품 제형센터 건립			37
			7.	기능성 원료은행 구축			38
			8.	청년식품 창업허브 구축			39
			9.	국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구			40
			10.	국가식품클러스터 복합문화센터 건립			41
			11.	식품산업(농식품기업 등) 육성 지원			42
			12.	입주기업 지원사업(교통수당, 임차비)			43

감사자료 공통사항

1. 2022년도 업무성과 및 반성

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

□ 성      과

◦ 맞춤형 투자유치 활동으로 분양계약 체결                           : 16개사  120천㎡

‣ 식료품 제조업(14개사), 연관업종(1개사), 물류업(1개사)

◦ 2023년 국가예산 확보 : 426.95억원 (2022년 403.22억 대비 23.73억 증액)

‣ (신규사업) 디지털식품정보플랫폼 구축 30.44억, 국클 성과분석 및 발전방안 용역 5억

◦ 기업비즈니스 지원

‣ 청년식품창업성장지원사업 : 80개팀 169명 지원, 55개팀 창업·사업화 성공

‣ 식품벤처센터지원 : 36개사 46실 입주, 벤처인증 27건 획득

‣ 비즈니스플랫폼 운영(100개사 1,002개 제품), 기업공동사업지원(18개사 9개과제), 통합마케팅활성화지원(51개사 142건 지원)

◦ 식품기업 인력양성 및 취업연계 지원

‣ 전문인력 양성 : 식품실무교육 407명 취업연계 18명, 현장실습지원 226명 취업연계 8명

‣ 입주기업 취업연계 : 매칭상담 465건, 고용연계 70명(17개사), 일자리협의체 운영(분기별)

‣ 지역주도형 일자리 : 22개사 39명

◦ 기업기술 지원 사업

‣ 공동기술개발 지원사업 : 39개사 42건 포장·레시피개선 추진

‣ 개방형 장비 공동활용 지원 : 434개사 11,261건 지원

‣ 식품기업 시설인증 지원 : 31개사 39건 HACCP, GMP인증 등 추진

◦ 국가식품클러스터 입주기업 지원사업 추진

‣ 교 통 수 당 : 659,500천원(57개사 637명, 누적 6,595명)

‣ 기숙사 임차비 : 113,776천원(18개사 34명, 누적 463명)

◦ 식품산업(농식품기업 등) 육성 지원

‣ 농식품기업 맞춤형지원사업 등 12개 사업 : 33개소(서동물산, 케어팜 등)

‣ 식품기업 마케팅, 포장재, 박람회 부스비, 창업 식품기업 지원 등

◦ 국토교통부 신규 국가산단 후보지 선정(2단계) 노력

‣ 신규 국가산단 후보지 제안서 제출(‘22. 10.), 국토연구원 합동설명회 및 현장점검(’22. 10. ~ 11.)

□ 반      성

◦ 식품기업의 인력 수급 및 일자리 미스매치 해소 부족

‣ 체계적 인력수급 시스템 개선으로 식품기업 인력 부족 현상 해결 및 고용안정화 도모

2. 2022년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

(단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액				지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2022 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액
국가식품클러스터담당관				16,553,850	11,839,095	4,201,060	513,695	12,499,084	3,983,228	17,221	54,317	75.5%
	국가식품클러스터			16,413,199	11,698,444	4,201,060	513,695	12,359,700	3,983,228	17,221	53,050	75.3%
		국가식품클러스터사업		15,922,725	11,337,470	4,201,060	384,195	11,884,253	3,983,228	10,400	44,844	74.6%
			식품클러스터 사업	134,251	57,360	76,891		52,378	76,891		4,982	39%	사고/참고1
			인력자원 개발 및 교육 지원	30,000	30,000			30,000			0	100%
			국가식품클러스터 기관운영관리	979,000	979,000			979,000			0	100%
			국가식품클러스터 투자유치 및 홍보	130,000	130,000			130,000			0	100%
			국가식품클러스터 기업비즈니스지원	298,000	298,000			298,000			0	100%
			국가식품클러스터 기업기술지원	205,000	205,000			205,000			0	100%
			국가식품클러스터 입주 기업 교통수당 지원	660,000	660,000			659,500			500	100%
			국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원	128,000	128,000			113,776			14,224	89%
			기업이전비 지원	5,500	5,500			4,400			1,100	80%
			국가식품클러스터 홍보관 운영	2,400	2,400			2,059			341	86%
			국가식품클러스터 홍보전광판 운영	35,360	35,360			34,064			1,296	96%
			국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구	129,551			129,551	98,352		10,400	20,799	76%
			국가식품클러스터 복합문화센터 건립	3,927,082	2,620,000	1,198,712	108,370	1,578,725	2,348,357		0	40%	명시/사고/참고2
			소스산업화센터 건립(운영)	1,350,000	1,350,000			1,350,000			0	100%
			기능성 원료은행 구축사업	7,794,731	4,723,000	2,925,457	146,274	6,236,751	1,557,980		0	80%	명시
			국가식품클러스터 상징조형물 운영	9,850	9,850			8,248			1,602	84%
			스마트특성화 기반구축사업 지원	104,000	104,000			104,000			0	100%
		농식품유통사업지원		490,474	360,974	0	129,500	475,447	0	6,821	8,206	97%
			식품산업 육성지원	73,580	73,580			69,678			3,902	95%
			농촌자원 복합 산업화 사업 (농식품기업 맞춤형 지원사업)	91,000	91,000			89,727		909	364	99%
			메이커 스페이스 구축 운영사업	16,000	16,000			16,000			0	100%
			전통식품 마케팅 활성화지원	80,000	80,000			80,000			0	100%
			창업 식품기업 지원사업	19,719	19,719			19,719			0	100%
			전통식품 체험시설 지원사업	129,500			129,500	129,500			0	100%
			식품기업 국가식품클러스터 기업지원시설 활용지원	25,675	25,675			15,822		5,912	3,941	62%	참고3
			국가식품클러스터 계약재배 활성화 사업	55,000	55,000			55,000			0	100%
	행정운영경비 (국가식품클러스터담당관)			26,027	26,027			24,797			1,230	95%
		기본경비		26,027	26,027			24,797			1,230	95%
			기본경비	26,027	26,027			24,797			1,230	95%
	재무활동 (국가식품클러스터담당관)			114,624	114,624			114,587			37	100%
		보전지출		114,624	114,624			114,587			37	100%
			보전지출	114,624	114,624			114,587			37	100%

참 고	2022년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원, %)

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부 진 사 유
1	식품클러스터 사업	134,251	52,378	39%	□국가식품클러스터 문화도시 기본계획 용역‘23 5월 완료 예정 - 사고이월 76,891천원
2	국가식품클러스터 복합문화센터 건립	3,927,082	1,578,725	40%	□건립공사 준공‘23. 7월 예정 - 명시이월 1,862,145천원 - 사고이월 486,212천원
3	식품기업 국가식품클러스터 기업지원시설 활용지원	25,675	15,822	62%	□기업지원시설 장비 이용비 코로나19 할인(약 70%)으로 집행잔액 발생

3. 2022년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•국가식품클러스터 2단계 확대 조성 관련 ▸현재 분양률이 75.8%로 2024년이면 100% 분양 예정인바 전북도, 지역정치권과 유기적 협조를 통해 2단계 확장이 조속히 추진될수 있도록 노력하기 바람.	▸국토부 신규 국가산단 후보지로 ‘23년 3월 선정되었으며, 지역정치권, 농식품부 및 전북도와 협업하여 신속하게 사업추진이 되도록 노력하겠음
2	•식품문화도시 기본계획 용역 관련 ▸현재 용역 중지 상황으로 그 이유에 대한 설명 요구	▸상위계획인 농식품부 종합계획과 상충 우려 등으로 용역을 중지하였으나, 2단계 신규 국가산단 후보지 선정으로 ‘23년 5월 재착수하겠음.
3	•국가식품클러스터 배후도시 조성 관련 ▸입주근로자들이 완주나 전주로 유출되지 않도록 정주여건을 개선할수 있는 배후도시가 조기에 조성될수 있도록 노력하기 바람.	▸1단계 내 공동주택(674세대)이 ‘23년 9월 준공 예정이며 사업위치, 규모 등을 검토하기 위한 식품문화도시 용역을 재개해 배후도시에 관한 결론을 도출해 내겠음.
4	•국가식품클러스터 민원 관련 ▸클러스터 우수관이 흥암천과 연결되어 있어 토지유실이 심각한 상황으로 흥암천을 정비할수 있는 방안을 조속히 마련하기 바라며, 클러스터 주변 주민들의 각종 민원이 제기되고 있는바 관련부서와 협조하여 민원을 적극 해결해주기 바람.	▸흥암천 인근 유실된 제방은 건설과가 복구하였고, 국가식품클러스터 인근 발생 민원은 산업단지 조성자인 LH공사 및 관련 부서와 협조하여 적극 해결에 노력하겠음.
5	•산업단지 내 지반침하 관련 ▸지반침하 용역 결과 입주기업에 피해가 없도록 LH와 협조하여 문제가 해결될수 있도록 노력해주기 바람.	▸LH공사와 피해기업들이 협의하여 법원에 증거보전 신청하였으며, 법원 결정에 따라 원인 제공자가 처리하여 입주기업 피해가 최소화 되도록 노력하겠음.
6	•업무협약(MOU)등 체결 관련 ▸21년 업무협약 30개 업체 중 5개 업체가 분양계약을 체결하지 않고 있어 분양계약이 체결 될수 있도록 노력하기 바라며, 규모가 있는 앵커업체인 천일식품과, 아하식품이 조기에 착공하여 클러스터가 더욱 활성화 될수 있도록 노력하기 바람. ▸입주업체에 대한 재무건정성 평가 등을 통해 건실한 업체가 입주될수 있도록 노력하기 바람.	▸건축비, 원자재 등 물가폭등으로 신규투자에 대한 자금확보가 어려워지고 경기 침체로 기업경영 악화되어 투자를 유보하는 기업들이 발생하였음 ▸기업들이 조속히 분양 계약을 체결하고 착공할 수 있도록 지속적으로 독려하겠으며, 천일식품의 경우는 올 7월에 착공예정으로 700억 규모의 투자가 이뤄질것으로 보임. ▸또한 기업유치 시 재무상태 등 확인하여 건실한 기업이 유치 될 수 있도록 노력하겠음.
7	•국가식품클러스터 홍보전시관 관련 ▸홍보전시관 활용방안 검토 내용에 대한 설명 및 검토 자료에 대한 자료 제출 요청	▸교양편익시설로만 사용 가능하여 임대 공고를 실시하였으나 2차례 유찰됨. 청내 각 부서에 발송한 수요조사 공문 사본 제출 완료.
8	•국가식품클러스터 해외 기업 유치 관련 ▸당초 계획에 비해 해외 기업유치 실적이 저조한바, 해외 기업유치를 통해 아시아 식품수로로써 발돋움할수 있도록 노력하기 바람.	▸러시아의 우크라이나 침공 등 국제 정세 혼란 및 세계경제 침체로 해외 기업 유치가 더욱 어려워지고 있음이 현실. ▸해외기업 유치를 위해 Kotra 식품분야 PM 및 Invest Korea 투자전략팀과도 교류하여 해외 식품기업 동향파악에 노력하고 있음. ▸주한유럽상공회의소 등에 방문하여 국가식품클러스터 산업단지 주요 인센티브 및 지원시설 안내 ▸영문판 투자제안서를 제작하고 해외 주요 식품기업에 메일로 보내 국가식품클러스터 산업단지를 홍보하고 있음.
9	•입주기업 지원사업(교통수당) 관련 ▸교통수당 지원사업 지속 추진 여부에 대한 검토가 필요하며 입주기업에서 출퇴근 셔틀버스의 운영을 요청하고 있어 필요성에 대하여 심도 있게 검토해보기 바람. ▸교통수당 지원 예산부담이 늘어감에 따라 국비나 도비 지원을 통한 교통수당 지원 방안을 검토하기 바람.	▸교통수당 예산 부담이 매년 증가함에 따라 출퇴근 셔틀버스 운영 방안 검토중이며 이를 위해서는 전북도 ‘산업단지 전세버스 허용 고시’가 필요함 ▸전세버스 허용고시를 위해서는 익산시 운수협회와 협의문이 필수조건이나 현재 국클산단 내 버스 운행 등의 사유로 협의가 어려운 상황임 ▸현재 타 산업단지와의 형평성을 이유로 교통수당 국·도비 지원은 어려우나, 향후 출퇴근셔틀버스 도입시 도비 지원 가능(3산단 통근 버스 운행사업 도비 30% 지원 중)
10	•집행잔액 및 명시이월예산 관련 ▸예산 집행 실적이 저조하여 집행잔액이 과도하게 발생되고 있으며 그에따라 명시이월 예산이 많이 발생하고 있는바, 예산의 효율성을 위하여 적정하게 예산이 편성되어 이월 예산이 최소화 될수 있도록 노력하기 바람.	▸각 사업 추진 시 면밀한 검토를 통해 적정한 예산을 편성하고 적극적인 추진을 통해 집행잔액 및 명시이월의 발생을 최소화하도록 노력하겠음.
11	•지방보조금 성과평가 관련 ▸지방보조금 성과평과 결과 미흡이나 매우미흡으로 평가된 사업에 대해서는 행안부 지방보조금 관리기준에 의거 사업을 추진하기 바람.	▸지방보조금 성과평가 결과 미흡 또는 매우미흡으로 평가된 사업은 행안부 지방보조금 관리기준에 맞게 추진하도록 하겠음.
12	•행정사무감사 보고서 작성 관련 ▸의회에서 요구한 보고서 작성양식에 맞게 보고서가 작성될 수 있도록 시정하기 바람.	▸의회에서 요구한 보고서 작성양식에 맞게 검토하고 작성하도록 하겠음.

4. 2022년도 감사시 지적사항 및 조치결과

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□

발언 의원 /발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
이순주 의원 / 제242회	∙중앙동, 평화동, 마동 등 구도심 활성화 방안 관련하여 ▸ 마동 하이트진로공장의 관내 부지(국가식품클러스터 등)로 이전 협의 검토	□‘22년 5월과 7월 부시장 및 보좌관 등 담당부서장들과 하이트 진로공장 이전에 대한 면담 등 지속적으로 동향을 파악하고 있으며, □향후 향토기업인 하이트진로(주)가 타지역으로 이전하지 못하도록 각종 인센티브를 활용하여 관내로 이전할 수 있도록 독려하겠음.

6. 시정질문 조치 결과

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

질문 의원 / 질문 회기	질문 요지	처리결과 및 금후계획	비고
장경호 248회 제2차	□우리시의 아젠다를 명확히 할 필요가 있으며, 우리시의 미래 산업인 ‘식품산업’이 그 중심이 되어야 한다고 생각하는데 이에 대한 견해와 향후 계획은?	□현재까지 127개사와 분양계약 체결 및 분양률 78.8%를 달성하며 25년 분양이 완료될 것으로 예상. □대선 공약이었던 국클 2단계가 23년 3월 신규 국가산단 후보지로 선정. □2단계는 단순 식품 제조 중심의 산업단지를 넘어 푸드테크 기반 미래 식품산업 경쟁력을 강화하고, 문화와 관광을 연계한 식품문화복합산업단지로 조성하여 우리나라 100년 먹거리를 책임지는‘식품도시’로 발돋움 할 수 있도록 노력하겠음

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황(예산, 내용 등)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

8. 주요사업 조서 (3천만원 이상)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

(단위 : 천원)
사업명	사업내용	사업비	집행액	잔액	추진상황
합 계		16,334,055	12,293,451	4,040,604
식품클러스터 사업	국내외 투자상담 및 투자컨설팅단 운영, 문화도시 기본계획 용역	134,251	52,378	81,873	□23.5. 완료예정 □사고 76,891 □잔액 4,982
인력자원 개발 및 교육지원	지역선도대학 육성사업 3년차	30,000	30,000	0	□완료
국가식품클러스터 기관운영관리	한국식품산업클러스터진흥원 운영지원(인건비, 운영비 등)	979,000	979,000	0	□완료
국가식품클러스터 투자유치 및 홍보	국내외 투자유치 , 투자유치 홍보 등	130,000	130,000	0	□완료
국가식품클러스터 기업비즈니스 지원	기업 성장지원, 마케팅판매지원, 청년식품창업LAB 운영 등	298,000	298,000	0	□완료
국가식품클러스터 기업기술지원	기업공동 기술개발지원, 산학연 네트워크 활성화	205,000	205,000	0	□완료
국가식품클러스터 입주기업 교통수당 지원	입주기업 교통수당 지원	660,000	659,500	500	□집행잔액
국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원	입주기업 기숙사 임차비 지원	128,000	113,776	14,224	□집행잔액
홍보전광판 운영	국가식품클러스터 입구 홍보전광판 운영	35,360	34,064	1,296	□집행잔액
국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구	활성화 방안 마련 및 산업단지 확장 타당성 연구	129,551	98,352	31,199	□22. 3월 용역 완료 □반납 10,400 □잔액 20,799
국가식품클러스터 복합문화센터 건립	건립공사 및 감리용역 추진	3,927,082	1,578,725	2,348,357	□ 23. 7월 준공 예정 □명시 1,862,145 □사고 486,212
소스산업화센터 건립(운영)	소스산업화센터 운영지원	1,350,000	1,350,000	0	□완료
기능성 원료은행 구축사업	기능성 원료은행의 건축, 장비 구축 및 운영지원	7,794,731	6,236,751	1,557,980	□ 24. 2월 준공 예정 □명시 1,557,980
스마트특성화 기반구축사업 지원	기능성제형센터 인프라 활용 시제품 생산지원, 인력양성 등	104,000	104,000	0	□완료
식품산업 육성지원	식품기업 포장재, 마케팅, 박람회 부스비 등 지원	73,580	69,678	3,902	□집행잔액
농촌자원 복합 산업화 사업	농식품기업 맞춤형 하드웨어 및 S/W 지원	91,000	89,727	1,273	□집행잔액
전통식품 마케팅 활성화 지원	전통식품 마케팅 활성화, 제품개발 등 지원	80,000	80,000	0	□완료
전통식품 체험시설 지원사업	전통식품 체험장 건축 및 관련 기기, 물품 등 지원	129,500	129,500	0	□완료
계약재배 활성화 사업	입주기업과 계약재배를 체결한 농산물에 종자, 비료, 운반비 등 지원	55,000	55,000	0	□완료

9. 2022년도 각종 민원 접수 처리내역 (진정,건의,청원 등)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

10. 기금 운용 관련사항

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

12. 용역사업 관련

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

용역구분	용 역 명	예산액	계약금액	집행액	용역업체	계약방법	비고
기술	국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획 용역	200,000	153,779	76,889	㈜더한건설	경쟁입찰	용역중지
기술	국가식품클러스터 복합문화센터 기본 및 실시설계 용역	180,000	154,814	154,814	㈜공간공감 건축사 사무소	설계공모	‘22.2.21.완료
학술	국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구용역	300,000	227,902	227,902	한국농촌 경제연구원	협상에 의한계약	‘22.3.21.완료

13. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

14. 각종공사 설계변경 상황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사업비	집행액	집행잔액	비고
국가식품클러스터 복합문화센터 건립	- 부지 2,271㎡(687평), 연면적 1,118.13㎡ (338평)	3,927,082	1,578,725	2,348,357	□명시 1,862,145 □사고 486,212

16. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

(단위 : 천원)

보조단체	보조사업명	예산액	집행액	잔 액	비 고
계	13개 사업	11,964,421	10,376,659	1,587,732
239바이오 등 57개사	국가식품클러스터 입주기업 교통수당 지원	660,000	659,500	500	완료
더원푸드 등 18개사	국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원	128,000	113,776	14,224	완료
한국식품산업 클러스터진흥원	소스산업화센터 건립(운영)	1,350,000	1,350,000	0	완료
한국식품산업 클러스터진흥원	기능성원료은행 구축사업	7,794,761	6,236,751	1,557,980	진행
한국식품산업 클러스터진흥원	스마트특성화 기반구축사업 지원	104,000	104,000	0	완료
담꽃 등 20개사	식품산업육성지원	73,580	69,678	3,902	완료
(사)전북창업공유지원단	메이커 스페이스 구축사업	16,000	16,000	0	완료
㈜청하식품	농촌자원 복합산업화사업 (농식품기업 맞춤형 지원사업)	91,000	89,727	1,273	완료
㈜이은	창업 식품기업 지원사업	19,719	19,719	0	완료
황수연전통식품 영농조합법인	전통식품 체험시설 지원사업	129,500	129,500	0	완료
더소스랩 등 4개사	식품기업 국가식품클러스터 기업지원시설 활용지원	25,675	15,822	9,853	완료
여산농협 등 3개소	국가식품클러스터 계약재배 활성화 사업	55,000	55,000	0	완료
㈜선해수산 등 8개사	기업이전비 지원	1,517,186	1,517,186	0	완료

17. 국․도비 보조사업 집행현황 (1억원 이상)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집 행 액				잔 액	비 고
		계	국 비	도 비	시 비
계	13,330,864	9,393,328	5,198,040	1,813,984	2,381,304	3,937,536
활성화방안 마련 연구용역	129,551	98,352	0	32,784	65,568	31,199	□도비반납 10,400 □잔액 20,799
국가식품클러스터 복합문화센터 건립	3,927,082	1,578,725	0	972,044	606,681	2,348,357	□명시이월 1,862,145 □사고이월 486,212
소스산업화센터 건립(운영)	1,350,000	1,350,000	675,000	202,500	472,500	0	□완료
기능성원료은행 구축사업	7,794,731	6,236,751	4,523,040	514,156	1,199,555	1,557,980	□명시이월 1,557,980
전통식품 체험시설 지원사업	129,500	129,500	0	92,500	37,000	0	□완료

18. 지방보조금 성과평가 내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	농산물지원계장		김 명 하	□

□ 2022년(2021년 지방보조사업) 지방보조사업 3년 미만 사업 평가결과

◦ 우수(A): 2건

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	총사업비	사업내용	평가결과	평가결과 반영내역
	2개 사업	788,000
1	국가식품클러스터 입주기업 교통수당 지원	660,000	∙국클 산업단지 내 입주기업이 익산시 거주 근로자에게 월 10만원 지원	우수(A)	계속지원
2	국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원	128,000	∙국클 산업단지 내 입주기업이 근로자에게 기숙사를 제공하는 경우 기숙사 임차비 지원	우수(A)	계속지원

□ 2022년(2021년 지방보조사업) 지방보조사업 3년 이상 계속사업 평가결과

◦ 보통(B): 3건, 미흡(C): 1건, 매우미흡(D): 1건

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	총사업비	사업내용	평가결과	평가결과 반영내역
	5개 사업	85,600
1	식품기업 마케팅 활성화 지원	25,000	∙홍보 마케팅 부족한 식품기업에 홍보물 제작비 지원	보통(B)	계속지원
2	국내 식품박람회 참여업체 부스비 지원	16,000	∙국내 식품박람회 참가 부스비 일부 지원	보통(B)	계속지원
3	소규모 농식품제조기업 포장재 지원	25,000	∙포장재 디자인 개발 및 제작 지원	보통(B)	계속지원
4	소규모 식품제조 기업 콘테이너 박스 지원사업	3,600	∙식품 원료 및 완제품의 보관·운반을 위한 콘테이너박스제작·구입비 지원	미흡(C)	지원중단
5	메이커 스페이스 체험활동 사업	16,000	∙관내 농산물을 활용한 메이커 체험프로그램 및 행사 운영	매우미흡(D)	지원중단

19. 2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 이월사업 개요

(단위 : 천원)

구 분	건 수	이월액	집행액	잔 액	비 고
명 시 이 월	3건	4,201,060	3,637,957	563,103
사 고 이 월	4건	513,695	482,496	31,199

□ 명시이월사업 추진

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	비 고
계 (3건)	4,201,060	3,637,957	563,103
식품문화도시 기본계획 용역	76,891	0	76,891	사고이월 76,891
국가식품클러스터 복합문화센터 건립	1,198,712	712,500	486,212	사고이월 486,212
기능성 원료은행 구축사업	2,925,457	2,925,457	0	집행완료

□ 사고이월사업 추진

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	비 고
계 (4건)	513,695	482,496	31,199
국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구용역	129,551	98,352	31,199	집행잔액
국가식품클러스터 복합문화센터 건립 설계	108,370	108,370	0	집행완료
기능성 원료은행 구축사업	146,274	146,274	0	집행완료
전통식품 체험시설 지원 사업(전환사업)	129,500	129,500	0	집행완료

20. 2023년도 명시이월 내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 명시이월 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	명시이월액	명시이월사유	비고
계 (2건)	3,420,125
국가식품클러스터 복합문화센터 건립	1,862,145	‣ 공사기간이 22. 3월부터 23. 7월까지로 준공시기 미도래
기능성 원료은행 구축사업	1,557,980	‣ 2022년 8월 착공 및 농식품부 국비 하반기(10월) 교부

21. 2023년도 명시이월(의회 제출) 후 2022년도에 집행한 내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

22. 예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

								(단위 : 천원)
일자	사업명	사업개요			계약액		계약자		공사기간	변경사유
2022.8.8	국가식품클러스터 복합문화센터 건립공사	·사업기간:‘20.~‘23 ·총사업비 4,000,000 ·사업량 연면적 1,118.13㎡(지상2층)			3,345,144		㈜아이엔지 외 3개사		(당초) 2022. 04. 05.~ 2023. 04. 04. (변경) 2022. 04. 05.~ 2022. 05. 26.	관급자재(철근) 수급지연에 따른 공사지연 일수 반영

24. 국‧도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유 (2022년도 반납건)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 2022년도 반납건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	691,000	731,756	40,729	49,251
소스산업화센터(운영)	671,000	201,300	40,697	12,209	집행잔액 및 이자
국가식품클러스터 복합문화센터 건립(설계)		83,178		829	집행잔액 및 이자
21년 국가식품클러스터 조성사업(20년 이월)		26,365		1,937	집행잔액 및 이자
21년 창업 식품기업 지원사업		18,500		41	이자
21년 농식품기업 HACCP 컨설팅 지원사업		18,000		6,000	집행잔액
20년 농식품기업 맞춤형 지원사업		150,000		400	집행잔액
21년 농식품기업 맞춤형 지원사업		205,000		10,000	집행잔액
21년 식품기업 국가식품클러스터 기업지원시설 활용지원		29,413		17,835	집행잔액 및 이자
21년 종균활용 발효식품산업지원	20,000		32		집행잔액 및 이자

□ 2023년도 반납예정건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 예 정 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	0	123,589	0	17,221
국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구	0	43,184	0	10,400	집행잔액 및 이자
농촌자원 복합산업화사업(농식품기업 맞춤형지원사업)	0	65,000	0	909	집행잔액 및 이자
식품기업 국가식품클러스터 기업지원시설 활용지원	0	15,405	0	5,912	집행잔액 및 이자

26. 2022년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

27. 2022년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

28. 2022년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

29. 2022년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

31. 소송 사건 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

32. 시 홈페이지에 접수된 민원처리 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□
작성자	:	농산물지원계장		김 명 하	□

민원종류	건명	요구내용	처리내용	비고
시정에 바란다 (2022.01.24.)	익산시에 원하는 작은 바램 (민원인 : 한○진)	▸익산시만의 지역대표 빵(예:미륵사지 빵) 개발 관련	▸익산시는 (사)대한제과협회익산시지부를 통해 익산시 지역대표 빵인 ‘익산팡’을 2016년에 출시한 바 있음 ▸현재도 익산역과 터미널 인근 빵집에서 판매되고 있음
시정에 바란다 (2022.03.16.)	익산시 수준 (민원인: 구○권)	▸식품클러스터 홈페이지에 있는 토지이용계획 정비 및 민원인 연락처 표시 요청	▸문의하신 내용은 ‘한국식품산업클러스터진흥원’ 홈페이지 내용이며, 해당 기관에 최신자료로 업데이트 하도록 안내하였음

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

36. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

해 당 없 음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□

연번	협약명	체결일자	대상	예산수반 여부	주요내용 (재정지원 등)	비고
1	투자협약	‘22.01.10	(농)㈜라이프드림	여	국가식품클러스터 투자 확정시 행‧재정적 지원	분양계약
2	〃	‘22.01.10	㈜엔테로바이옴	〃	〃	분양계약
3	〃	‘22.01.10	(농)㈜카리	〃	〃	분양계약
4	〃	‘22.01.27	㈜에프비홀딩스	〃	〃	분양계약
5	〃	‘22.02.09	송시㈜	〃	〃	분양계약
6	〃	‘22.02.25	절임마을㈜	〃	〃	분양계약
7	〃	‘22.03.22	㈜위바이옴	〃	〃	분양계약
8	〃	‘22.03.25	(농)(유)푸른채에프앤비	〃	〃
9	〃	‘22.03.31	㈜사애드홀딩스	〃	〃
10	〃	‘22.04.22	㈜엠디푸드	〃	〃
11	〃	‘22.04.22	㈜오성미가	〃	〃	분양계약
12	〃	‘22.04.28	㈜밀크트리	〃	〃	분양계약
13	〃	‘22.05.02	㈜커피창고	〃	〃	분양계약
14	〃	‘22.05.06	주현푸드(유)	〃	〃	분양계약
15	〃	‘22.05.23	농업회사법인㈜윤율	〃	〃	분양계약
16	〃	‘22.06.21	㈜유비쿼터스-추가	〃	〃	분양계약
17	〃	‘22.06.27	㈜프롬바이오	〃	〃	증설투자
18	〃	‘22.08.04	제로엔㈜	〃	〃
19	〃	‘22.10.28	순수본㈜	〃	〃	증설투자
20	〃	‘22.11.03	㈜아이요	〃	〃
21	〃	‘22.12.09	건식무역	〃	〃	분양계약
22	〃	‘22.12.30	신화엠푸드	〃	〃

국가식품클러스터담당관 요구사항

1. 국가식품클러스터 산업단지 조성(1단계)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2023년(15년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 흥암리, 광암리, 동촌리, 왕궁리 일원

◦ 총사업비 : 311,900백만원(용지비 80,000, 공사비 211,900, 기타 20,000)

◦ 사업내용 : 국가식품클러스터 조성 232만㎡(70만평)

▸ 산업시설용지(제조,연구,물류) 460천평, 상업용지 8천평, 주거용지 23천평

▸ 지원시설용지 27천평, 기반시설용지(도로,공원,폐수처리장) 182천평

◦ 사업시행자 : 한국토지주택공사(LH)

□ 추 진 실 적

◦ 국가식품클러스터 산업단지계획 승인 고시(국토부 제2012-354호)	: ‘12. 6. 29.

◦ 국가식품클러스터 내 시설물(화장실) 인계·인수	: ‘22. 3. 16.

◦ 국가식품클러스터 상징조형물 인계인수	: ‘22. 5. 26.

◦ 국가식품클러스터 산업단지 실시계획 변경 고시(익산국토청 제2022-88호)	: ‘22. 9.

▸ 유치업종 변경(식음료 제조업 및 물류시설용지 확장)

◦ 국가식품클러스터 산업단지 실시계획 변경 고시(익산국토청 제2022-111호)	: ‘22. 12.

▸ 공원 내 저류지 정비(데크조성) 시행분 개발기간 반영

□ 향 후 계 획

◦ 공원 내 저류지 정비(데크조성) 추진	: ‘23. 1. ~ 12.

2. 국가식품클러스터 배후복합도시 조성

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2027년

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 인근

◦ 총사업비 : 3,000억원(단지조성 2,500, H/W 500) *민자사업 추진(LH공사 등)

◦ 사업내용 : 배후복합도시 조성 119만㎡(36만평)

▸ 한옥단지, 외국인 맞춤형 주거단지, 체험관․박물관 등

◦ 개발방식 : 도시개발사업

□ 추 진 실 적

◦ 정주여건 기본구상 용역 추진(국가식품클러스터지원센터)	: ‘12. 10. ~ ’13. 3.

◦ 사업참여 요청(익산시⇒LH공사, 전북개발공사)	: ‘13.  5. ~ ’17. 2.

▸ 리스크 감소 및 사업성 확보를 위해 최소한의 면적 추진 등 소극적 의견

◦ 국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획 용역	: ‘18. 4. ~

▸ 용역 일시중지	: ’18. 11. 28. ~

- 1단계 산업단지 활성화 및 농식품부 종합계획 재정비 용역 추진시까지

◦ 산업단지 내 공동주택(674세대) 사업계획 승인	: ‘18. 7.

◦ 정주환경 조성을 위한 입주기업 및 주택소유자 간담회	: ’19. 4. 23.

◦ 공동주택 조기 착공을 위한 시행사 등 업무협의	: ‘20. 5. ~ ’21. 6.

◦ 공동주택 추진	: ‘21. 7. ~ ‘23. 9.

□ 문  제  점

◦ 농식품부의 국가식품클러스터 종합계획상 배후도시 사업규모(119만㎡), 사업위치 등에 대한 재검토 필요 및 농식품부 종합계획 미수립

⇒ 2단계 신규 국가산단 후보지 선정으로 배후도시 규모, 위치 등 결정 예정

□ 향 후 계 획

◦ 국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획 용역 추진	: ’23. 5. ~

▸ 자문회의 및 최종보고회 등

◦ 배후복합도시 추진을 위한 관계기관 협의, 행정절차(개발계획 등) 추진	: ’23. 12. ~

3. 국가식품클러스터 투자유치 활동

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	기업유치계장		홍 세 현	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 1,851백만원(국비 1,573, 도비 56, 시비 130, 자부담 92)

◦ 사업내용 : 국내·외 투자유치 활동(투자유치 활동 및 사후관리, 투자수요 발굴 등)

□ 추 진 실 적

◦ 분양계약 체결 : 12개사(신규계약)+3개사(양도양수)+1개사(추가계약)

▸ 2022년 분양 현황

[단위 : ㎡, 억원, 명]

구분	기 업 명	분양계약일	면 적	투자금액	고용인력	생산제품	비고
합계	16개		120,312.7	956	460
준공 (2)	㈜밀크트리	‘22.05.23	4,549.4	30	44	우유류·발효유
	농업회사법인㈜윤율	‘22.06.02	3,674.1	30	30	스테비아 토마토	양도양수
착공 (4)	㈜엔테로바이옴	‘22.02.24	6,831.1	78	12	건강기능식품	양도양수
	송시㈜	‘22.03.25	4,531.0	70	45	과자류
	㈜위바이옴	‘22.04.06	14,200.7	163	23	건강기능식품
	주현푸드(유)	‘22.05.19	10,578.7	100	20	양념쭈꾸미
미착공(9)	(농)㈜라이프드림	‘22.01.25	8,043.8	80	22	짬뽕라면, 컵라면
	(농)㈜카리	‘22.01.28	5,160.2	34	21	건강기능식품
	㈜에프비홀딩스	‘22.02.08	28,458.6	148	90	과일컵
	절임마을㈜	‘22.04.13	7,548.2	51	32	김치
	㈜오성미가	‘22.05.16	3,845.8	30	26	절임생선
	㈜커피창고	‘22.05.26	7,876.5	50	25	커피가공
	㈜늘푸른푸드	‘22.07.12	1,653.7	15	6	양념육	양도양수
	제이드시스템	‘22.12.22	3,945.9	-	-	물류
	건식무역㈜	‘22.12.23	4,795.2	47	55	김치
추가 계약 (1)	유비쿼터스	‘22.06.30	4,619.8	30	9	아이스팩

◦ 투자관심기업 초청 및 방문 투자상담	: 260회 / 143개사

▸ 국가식품클러스터 소개, 투자 인센티브 안내, 기업 니즈 파악 등

⇒ 투자양해각서(22개사) 및 분양계약(16개사)

◦ 투자컨설팅단(투자유치전문위원) 투자상담	: 55회 / 42개사

◦ 국내·외 지역순회형 투자설명회 개최 및 사후관리

▸ 식품유관기관 투자설명회 및 입주기업 대표 SNS 관계망 등 활용한 미니설명회 : 20회

▸ 분양기업 입주지원 회의 및 준공기업 CEO 소통간담회 추진	: 9회

▸ 고충처리자문단 활동	: 34회

◦ 투자유치 전문 홍보

▸ 홍보전광판, 보도자료, 지면광고, 온라인 홍보, 전문지 홍보 등

▸ 국가식품클러스터 토지이용 안내도 디지털 제작

▸ 구글, 네이버, 카카오 등 브랜드 검색 광고

▸ 홍보 영상 콘텐츠 제작 및 SNS 홍보

□ 문  제  점

◦ 앵커기업 유치 성과 미약

▸ 중앙정부(농식품부) 앵커기업 유치활동 및 유인정책 발굴 지속 건의하고 전북도, 진흥원, 지역 국회위원들과 긴밀히 공조하여 앵커기업 유치활동에 노력하겠음

□ 향 후 계 획

◦ 투자유치 활동	: ‘23. 1. ~

▸ 투자 가능성이 높은 식품기업을 대상으로 초청·방문 상담 및 관계기관이 참여한 투자이슈 대응협의회 등 운영

◦ 투자수요 발굴	: ‘23. 2. ~

▸ 외투기업 유치관련 주한대사관, 주한상공회의소 등과 연계해 국내에 기 투자한 해외기업 대상 투자설명회 개최

▸ 입주가 저조한 음료기업 유치관련 한국외식음료협회 등과 연계한 설명회 추진

◦ 국가식품클러스터 활성화 홍보	: ‘23. 1. ~

▸ 국가식품클러스터 기업지원사업 홍보 및 온라인 홍보

▸ 식품산업 관계자, 학교, 국회, 언론 등 대상으로 초청 및 견학 프로그램 운영

4. 기업비즈니스 지원 활성화

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 4,261백만원(국비 3,622, 도비 128, 시비 298, 진흥원 213)

◦ 사업내용 : 전문인력 양성, 벤처창업 활성화, 마케팅판매 지원

□ 추 진 실 적

◦ 전문인력 양성 및 취업연계 지원	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 식품실무교육지원 : 407명(식품기업 종사자 등), 취업연계 18명(해태, 매일유업 등)

▸ 현장실습지원 : 226명(고등학생 및 대학생), 취업연계 8명(대상, 하림, 비티씨 등)

▸ 인력수급지원사업 : 매칭상담 465건, 고용연계 70명(17개사), 일자리협의체 운영(분기별)

◦ 벤처창업 활성화 지원	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 청년식품 창업성장지원 : 80개팀 169명 지원하여 55개팀 창업․사업화 성공

▸ 벤처센터 입주기업지원 : 36개사 46실 입주, 벤처인증 27건 획득

◦ 마케팅·판매지원	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 비즈니스플랫폼 운영 : 100개사 1,002개 제품

▸ 기업공동사업 지원 : 18개사 9개 과제 지원

▸ 통합마케팅 활성화지원 : 51개사 142건 지원

□ 문  제  점

◦ 전문인력 양성 사업에도 불구하고 지속되는 식품기업 인력 부족

▸ 식품기업 특성상 타 산업 대비 낮은 임금에 대한 대책 마련 필요

▸ 인력수급 시스템 개선으로 식품기업 인력 부족 현상 해결 및 고용안정화 도모

□ 향 후 계 획

◦ 전문인력 양성	: ‘23. 1. ~ 12.

▸ 식품진흥원 시설․장비를 활용한 푸드테크 등 현장 중심의 밀착형 실무형 교육지원으로 식품산업에 특화된 맞춤형 전문 인력양성

◦ 벤처창업 활성화 지원	: ‘23. 1. ~ 12.

▸ 창업교육, 시제품 제작 등 청년 창업의 체계적 지원으로 식품 창업자 육성

◦ 마케팅·판매지원	: ‘23. 1. ~ 12.

▸ 온·오프라인 유통플랫폼 운영 및 마케팅 활성화 지원

5. 기업기술 지원

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	기업유치계장		홍세현	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 3,308백만원(국비 2,812, 도비 88, 시비 205, 진흥원 203)

◦ 사업내용 : 기업기술력 확보지원, 산학연 네트워크 활성화

□ 추 진 실 적

◦ 기업기술력 강화지원	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 공동기술개발 지원 : 39개사 42건 포장개선·레시피개선 추진

▸ 제품마켓테스트 지원 : 신제품 신규 유통채널(카카오메이커스) 입점 및 시장안착 유도

▸ 개방형장비 지원 : 434개사 11,261건 지원  *국클 입주·분양기업 우선지원

◦ 인증획득 지원	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 식품기업 시설인증 지원 : 31개사 39건 인증 추진(HACCP, GMP 등)

▸ 기업지원시설인증 : 식약처 비임상시험관리기준 인증(GLP)

◦ 산학연 네트워크 활성화	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 기업지원데스크 운영 : 266개사 418건

▸ GMP발전협의회, 생물안전위원회, 장비심의위원회 등 개최 : 수시

▸ 제12회 국가식품클러스터 국제컨퍼런스 개최	: ‘22. 6. 22.

- (대면) 613명 참석  (비대면) 유튜브 총 3,602회 조회, 기획기사 34,602회 조회

▸ DLG 국제식품품평회 참가	: ‘22. 7. 7. ~ 8.

- 가금류 가공품 27개 품목 수상(금상 22, 은상 3, 동상 2)

□ 향 후 계 획

◦ 기업 역량 강화를 위한 기술 및 인증 지원	: ‘23. 1. ~ 12.

▸ 기업 맞춤형 기술 지원을 통한 제품 개발 및 상품화 지원

▸ 개방형 장비 공동활용을 통한 시험분석 및 시제품 생산 지원 등

◦ 산학연 네트워크 활성화	: ‘23. 1. ~ 12.

▸ 기업지원데스크 운영 및 산학연 전문가 활용

▸ 제13회 국가식품클러스터 국제컨퍼런스 개최 및 DLG 국제식품품평회 개최

6. 기능성식품 제형센터 건립

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 총사업비 : 17,640백만원(국비전액)       - 부지매입비 별도 (660백만원, 시비)

▸‘22년 예산 : 5,033백만원 (국비전액)

◦ 규    모 : 건축 4,060㎡(1,230평), 부지 3,959.6㎡(1,200평),

▸ 주요시설 : 일반제형실, 특수제형실, 제형품질검사실, 연구실 등

◦ 사업내용

▸ 기능성식품 제형센터 설계용역 (1,000백만원 / 2019년)

▸ 기능성식품 제형센터 건립 (11,290백만원 / 2020년 ~ 2021년)

▸ 기능성식품 제형센터 장비 구축 (5,350백만원 / 2020년 ~ 2022년)

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

□ 추 진 실 적

	◦	기본계획설계 용역	:	‘19. 6. 3. ~ 8. 31.
	◦	기본 및 실시설계 용역	:	‘19. 12. 23. ~ ’20. 8. 17.
	◦	기능성식품 제형센터 부지매입	:	‘20. 6. 30.
	◦	기능성식품 제형센터 임시운영소 운영	:	‘20. 10. ~ ‘22. 4.
		▸위치 : 기능성평가지원센터 3층 표준화연구실(314호)
		▸장비활용실적 : 446건, 실무교육 실적 : 24회 143명
	◦	기능성식품 제형센터 건립공사 추진	:	‘20. 12. ~ ‘22. 4.
	◦	기능성식품 제형센터 장비구축	:	‘20. 12. ~ ’22. 11.
		▸연구장비 36종, 빌트인장비 8종, 생산장비 23종 도입완료

□ 향 후 계 획

◦	기능석식품 제형센터 운영	:	‘22. 12. ~

7. 기능성 원료은행 구축

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내 (왕궁면 광암리 1409)

◦ 총사업비 : 15,000백만원(국비 10,500, 도비 1,350, 시비 3,150)

▸‘22년 총예산 : 7,795백만원 (국비 5,613, 도비 655, 시비 1,527)

▸ 본예산 : 4,723백만원, 명시이월 : 2,926백만원, 사고이월 : 146백만원

◦ 규    모 : 건축 600㎡, 연면적 1,800㎡(지하 1층, 지상 3층)

◦ 사업내용 : 기능성 원료은행의 건축, 장비 구축 및 운영지원

▸ (원료개발) 신규 기능성 원료 발굴 및 기능성 규명

▸ (원료표준화) 기능성원료 표준화를 위한 제조공정 확립 및 생산

▸ (보관/분양) 표준화된 원료(또는 기능성분) 보관 및 공급

◦ 시행기관 : 익산시(한국식품산업클러스터진흥원 수행)

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 완료	: ‘22. 4.

◦ 기공식 개최 및 건립 공사 착공	: ‘22.. 8.

▸ 신축 주차장 시설 완료	: ‘22.. 11.

□ 향 후 계 획

◦ 건립공사 추진	: ‘23.. 1. ~

◦ 장비 구축	: ‘23. 1. ~ 12.

◦ 기능성 원료은행 준공	: ‘23. 12.

8. 청년식품 창업허브 구축

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(왕궁면 광암리 1427-1번지)

◦ 총사업비 : 28,232백만원(국비)       - 부지매입비 별도(1,695백만원, 시비)

▸‘22년 예산 : 8,427백만원(국비)

◦ 규    모 : 부지 9,544.3㎡(2,887평), 연면적 9,329.39㎡(2,822평, 지하1층, 지상4층)

▸ 주요시설 : 학습 및 체험공간, 커뮤니케이션 공간, 시제품 제작공간, 창업공간 등

◦ 시행기관 : 농림축산식품부, 전북도, 익산시, 한국식품산업클러스터진흥원

□ 추 진 실 적

◦ 공유재산 변경 심의 및 의회 의결	: ‘21. 4. 30./6. 11.

▸ 부지취득, 무상임대, 영구시설물 축조

◦ 토지 매매계약 체결	: ‘21. 5. 7.

◦ 토지 소유권 취득(LH공사 → 익산시)	: ‘21. 8. 19.

◦ 공유재산 무상사용 허가(익산시 → 진흥원)	: ‘21. 9. 1.

◦ 건축허가	: ‘21. 9. 16.

◦ 공사 착공	: ‘22. 4. 11. ~

◦ 청년식품창업허브 공사 기공식	: ‘22. 4. 14.

□ 향 후 계 획

◦ 건립공사 추진	: ‘23. 1. ~ ’24. 1.

◦ 장비구축	: ‘23. 10. ~‘24. 1.

◦ 준공 및 사용승인	: ‘24. 1.

◦ 시운전 및 시설 인계	: ‘24. 2.  ~‘24. 3.

9. 국가식품클러스터 활성화방안 마련 연구

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 국가식품클러스터 활성화 방안 마련 연구용역

◦ 용역기간 : 2020. 5. 13. ~ 2022. 3.

◦ 총용역비 : 300백만원(도비 100, 시비 200)

▸‘22년 예산(사고이월) : 129백만원 (도비 43, 시비 86)

◦ 주요내용 : 국가식품클러스터 1단계 역량강화, 집적화, 기능보강 및 2단계 개별사업 발굴 및 산업단지 확장 타당성 등

◦ 수행기관 : 한국농촌경제연구원, ㈜ 유라이징

□ 추 진 실 적

◦ 20대 대선 전북도 공약사업 선정	: ’21. 10. 20.

◦ 국가식품클러스터 활성화 용역 재착수	: ‘22. 2. 15.

▸ 최종보고회	: ’22. 3. 2.

▸ 용역 준공	: ’22. 3. 2.1.

◦ 20대 대통령직 인수위 전북지역 정책과제 보고회	: ‘22. 5. 4.

▸ 국가식품클러스터 2단계 확대 및 거점 조성

◦ (농식품부) 20대 대선공약(2단계) 기재부에 예산 요구	: ‘22. 5.

▸ 국가식품클러스터 성과분석 및 발전방안 용역(5억원)

◦ 국가식품클러스터 2단계 추진 건의(한덕수 국무총리)	: ‘22. 8. 3.

◦ 국토부 신규 국가산단 후보지 제안	: ’22. 8.~12.

□ 향 후 계 획

◦ 국가식품클러스터 2단계 사업 추진 건의	: ‘23. 1.~

◦ 국토부 신규 국가산단 후보지 선정	: ‘23. 3.

10. 국가식품클러스터 복합문화센터 건립

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	산단조성계장		남궁춘	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426-1번지(산업단지 지원시설용지)

◦ 총사업비 : 4,000백만원(도비 2,000, 시비 2,000)

▸‘22년 총예산 : 3,927백만원 (도비 1,963, 시비 1,964)

▸ 본예산 : 2,620백만원, 명시이월 : 1,199백만원, 사고이월 : 108백만원

◦ 규    모 : 부지 2,271㎡(687평), 연면적 1,118.13㎡(338평) 정도

◦ 사업내용 : 입주 근로자 정주여건 개선 및 기타 편의시설 구축

▸ 식당, 체력단련실, 전시판매장, 라이브방송실, 사무실 등

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 준공	: ‘22. 2. 21.

◦ 공사 및 감리용역 착수	: ‘22. 4. 5. ~

▸ 공사 및 감리용역 일시정지	: ‘22. 6. 17. ~ 8. 7.

- 사유 : 관급자재(철근) 납품지연 및 장마기간 도래에 따른 공사추진 지난

▸ 공사 및 감리용역 재착수	: ‘22. 8. 8.

▸ 동절기 공사 및 감리용역 일시정지	: ‘22. 12. 23. ~

□ 문  제  점

◦ 관급자재(철근) 수급 지연 및 동절기 부실공사 예방을 위한 공사 및 감리용역 일시정지로 공사기간 증가

⇒ 현장 및 공사기간 관리 철저

□ 향 후 계 획

◦ 공사 및 감리용역 재착수	: ‘23. 2.

▸ 공사준공	: ’23. 7.

◦ 관리·운영 조례 제정	: ‘23. 5.

◦ 위탁 의회 동의	: ‘23. 7.

◦ 관리·운영자 선정	: ‘23. 7.

11. 식품산업(농식품기업) 육성지원

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박갑수	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 농식품기업 맞춤형 지원사업

▸ 지원내용 : 제조가공시설, 기기·장비 교체 및 설치, 연구개발 등 지원

▸ 사 업 비 : 130백만원(도비 65, 시비 26, 자부담 39)

▸ 지원대상 : 농업생산자단체(영농조합법인, 농업회사법인 등) 및 식품기업

◦ 전통식품 마케팅 활성화 지원

▸ 지원내용 : 전통식품(전통주 포함) 공동 마케팅 프로모션 및 활성화 지원

▸ 사 업 비 : 100백만원(도균특 50, 시비 30, 자부담 20)

▸ 지원대상 : 전통식품(전통주 포함)을 직접 제조⸱판매하는 업체

◦ 식품산업 육성지원

▸ 세부사업 : 국가식품클러스터 농산물 공급 물류비 지원, 식품기업 마케팅 활성화 지원, 국내 식품박람회 참여업체 부스비 지원, 소규모 농식품제조기업 포장재 및 콘테이너 박스 지원

▸ 사 업 비 : 137백만원(시비 73.5, 자부담 63.5)

▸ 지원대상 : 농업생산자단체(영농조합법인, 농업회사법인 등) 및 식품기업

□ 추 진 실 적

◦ 농식품기업 맞춤형 지원사업 등 12개 사업 완료	: ‘22. 1. ~ 12.

▸ 사 업 비 : 771백만원(도비 230, 시비 244, 자부담 297)

▸ 지원대상 : ㈜청하식품 외 32개소

□ 향 후 계 획

◦ 농식품기업 맞춤형 지원 등 12개 사업 추진	: ‘23. 1. ~ 12.

▸ 사 업 비 : 859백만원(도비 250, 시비 301, 자부담 308)

▸ 지원대상 : ㈜담꽃 외 32개소

12. 입주기업 지원사업(교통수당, 임차비)

확인자	:	국가식품클러스터담당관		박 갑 수	□
작성자	:	식품인력계장		김미례	□
작성자	:	농산물지원계장		김명하	□

□ 사 업 개 요

◦ 지원기간 : 2022. 2. ~ 12.(11개월)

◦ 사 업 비 : (교통수당) 660,000천원(시비)

(임 차 비) 160,000천원(시비 128,000, 자부담 32,000)

◦ 지원대상 : 국가식품클러스터 산업단지 내 공장 가동중인 입주 및 벤처기업

◦ 사업내용

▸ (교통수당) 교통여건이 열악한 국가식품클러스터 산업단지 내 입주기업에 교통수당 지원 ⇒ 근로자 1인당 매월 100천원

▸ (임차비) 거주 여건이 열악한 국가식품클러스터 산업단지 내 입주기업이 관내 아파트, 빌라, 원룸 등 공동주택을 임차하여 근로자에게 기숙사로 제공하는 경우 기숙사 임차에 소요되는 임차료(월세) 80% 지원 ⇒ 기숙사 1개소당 최대 300천원

▸ 해당 근로자는 4대 보험 가입(재직 확인용), 익산시 주소 이전 필수

□ 추 진 실 적

◦ 교통수당 지원실적 : 57개사 637명, 누적 6,595명(2~12월 누계), 659,500천원 지급    ◦ 임차비 지원실적 : 18개사 34명, 누적 463명(2월~12월 누계), 113,776천원 지급

◦ 참여기업 편의를 위한 현장방문 접수(진흥원)	: 11회

◦ 보조금 교부신청 및 교통수당, 임차비 지급(매달)	: ‘22. 2. ~ 11.

□ 문  제  점

◦ 준공기업 증가로 인한 연간 교통수당 지원대상 및 예산부담 증가

▸ (‘20) 3,275명 ⇒ (‘21) 4,450명 ⇒ (‘22) 6,595명 ⇒ (‘23) 7,200명 예상

◦ 출퇴근 셔틀버스 운영 등 대안 검토 필요

▸ 전라북도‘산업단지 전세버스 허용 고시’를 위해 익산시 운수협회와 협의문이 필수조건이나 산단 내 버스운행 등의 사유로 협의가 어려운 상황임

□ 향 후 계 획

◦ 참여기업 편의를 위한 현장방문 접수(식품진흥원)	: 11회

◦ 보조금 교부신청 및 교통수당, 임차비 지급	: ‘23. 2. ~ 12.

◦ 교통수당 및 기숙사 임차비 내년도(‘24년) 수요조사 실시	: ‘23. 9월중