2023.  5.

제251회 익산시의회(제1차 정례회)

2023 행정사무감사자료

	건설국

목     차

□	도시개발과	………	1
□	도시전략사업과	………	101
□	건설과	………	157
□	주택과	………	243
□	도로관리과	………	323
□	교통행정과	………	397
□	차량등록사업소	………	501

건  설  과

□			감사자료 과 공통사항
			1.	2022년도 업무성과 및 반성	163
			2.	2022년도 예산집행 및 추진사항	164
			3.	2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	170
			4.	2022년도 감사시 지적사항 및 조치 결과	178
			5.	5분 자유발언 조치 결과	179
			6.	시정질문에 대한 조치 결과	180
			7.	의원발의 조례 제ㆍ개정 후 추진현황	182
			8.	주요사업 조서 (3천만원 이상)	182
			9.	2022년도 각종 민원(진정·건의·청원 등) 접수 처리내역	192
			10.	기금 운용 관련	193
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	193
			12.	용역사업 관련	195
			13.	인․허가 민원처리 관련사항	199
			14.	각종 공사 설계변경 상황	200
			15.	건설공사 집행 현황 (3천만원이상)	204
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	204
			17.	국.도비 보조사업 집행현황 (1억원이상)	205
			18.	지방보조금 성과평가 내역	206
			19.	2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역	206
			20.	2023년도 명시이월 내역	210
			21.	2023년도 명시이월(의회 제출) 후 2022년도에 집행한 내역	212
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황	212
			23.	공사 준공기한 연장 내역	213
			24.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	213
			25.	국․도비 반납 현황 및 사유 (2022년도 반납건)	214
			26.	2022년도 계획사업 중 미착공사업 현황	215
			27.	2022년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황	216
			28.	2022년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황	216
			29.	2022년도 예산편성 후 전액 미집행 내역	217
			30.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황	218
			31.	소송 사건 현황	218
			32.	시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	219
			33.	시설‧사무 민간위탁 현황	220
			34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황	220
			35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황	220
			36.	시 산하 재단 설립 현황	221
			37.	업무협약(MOU) 등 체결 현황	221

□			감사자료 과 요구사항
			1.	2022년도 시군도 및 농촌도로 확·포장사업		225
				-진행중인 시군도 및 농촌도로 현황 (이월및계속사업)		225
				-2022년도 신규사업 현황		227
				-2022년도 준공된 사업현황		227
				-2022년도 예산 미확보사업 (이월 및 계속사업)		227
			2.	국도27호 서수~평장간 국도대체우회도로 용지보상		228
			3.	생활여건 개선을 위한 주민숙원사업		230
			4.	농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성사업		231
			5.	숭모공원~석치마을간 도로확포장공사		232
			6.	지방하천 왕궁천 정비사업		233
			7.	지방하천 동면천 정비사업		234
			8.	진사소하천 정비사업		235
			9.	황각소하천 정비사업		236
			10.	만경강 친수시설 유지관리		237
			11.	만경강 문화관 운영 및 관리		239
			12.	금강 용안생태습지 유지관리		241
			13.	하천제방 유지관리		242

감사자료 과 공통사항

1. 2022년도 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 성    과

◦ 농어촌도로 확포장공사 4개 면지역(L=2.81km, B=8.0m) 완료하여 농촌지역 차량통행 불편해소 및 농업경제활성화 기여

▸오산역~상아마을간 도로확포장(L=0.2km, B=8.0m) 완료  : 2022. 4. 21.

▸왕궁 양동마을 진입도로 확포장(L=0.6km, B=8.0m) 완료  : 2022. 6. 10.

▸춘포 토다리~덕동간 도로확포장(L=1.0km, B=8.0m) 완료 : 2022. 6. 13.

▸금마 누동~신촌간 도로확포장(L=1.01km, B=8.0m) 완료  : 2022. 8. 25.

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

▸소규모 주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비 등 민원 처리	: 220건

◦ 지방하천 정비사업을 통한 재해예방 및 친수공간 조성

▸왕궁천 하천정비공사(1지구) 준공	: 2022.  8.

▸동면천 하천정비공사 착공	: 2022.  9.

◦ 만경강의 역사·문화 등을 홍보하고 다양한 문화 체험 공간을 제공하는  만경강문화관 개관	: 2022.  3.

□ 반      성

◦ 비법정도로 개설 사업의 토지사용승락 징구 지연으로 명시이월 예산 증가

▸토지사용승락 불가시 신속한 위치변경으로 예산 이월 최소화 추진

2. 2022년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

【2022.12.31.현재】                                                               (단위 : 천원.%)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액						지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계(A)	2022 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액	계속비 이월액	예비비 사용액
건설과				50,671,622	36,050,999	5,036,349	1,051,135	8,533,139	0	34,227,925	14,816,938	22,179	1,604,580	67.5
	도로시설관리			14,409,633	10,317,280	3,570,149	522,204	0	0	7,999,504	5,585,144	0	824,985	55.5
		시군농어촌도로확포장		9,795,963	7,706,000	1,925,802	164,161	0	0	5,732,168	3,985,325	0	78,470	58.5
			금마갈산-서편간도로확포장공사	942,593	900,000	42,593	0	0	0	525,400	417,193	0	0	55.7	(참고1) 명시
			삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	500,000	500,000	0	0	0	0	422,118	77,882	0	0	84.4	명시
			미불용지매입비(시군도농어촌도로)	648,000	648,000	0	0	0	0	631,678	0	0	16,322	97.5
			춘포 토다리-덕동간 도로확포장공사	790,000	790,000	0	0	0	0	774,505	0	0	15,495	98.0
			금마 누동~신촌간 도로확포장	400,000	400,000	0	0	0	0	371,850	0	0	28,150	93.0
			군도 23호선 도로 확포장공사	191,361	0	191,361	0	0	0	151,564	39,797	0	0	79.2	사고
			시군도 도로관리계획및 농어촌도로 기본계획 용역	77,913	0	77,913	0	0	0	0	70,776	0	7,137	0	(참고2) 사고
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	910,258	450,000	460,258	0	0	0	88,989	821,269	0	0	9.8	(참고3) 명시 450,000 사고 371,269
			오산면 소재지 진입도로 확포장공사	1,107,142	1,000,000	0	107,142	0	0	988,338	118,804	0	0	89.3	명시
			황등 도선-외화간 도로 확포장공사	400,000	400,000	0	0	0	0	170,423	229,577	0	0	42.6	(참고4) 명시
			오산역-상아마을간 병목구간 도로확포장공사	50,000	50,000	0	0	0	0	49,672	0	0	328	99.3
			하나로~소간촌간 도로 확포장공사	500,000	500,000	0	0	0	0	39,480	460,520	0	0	7.9	(참고5) 명시
			왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사	482,641	430,000	52,641	0	0	0	471,603	0	0	11,038	97.7
			춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	(참고6) 명시
			금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	300,000	300,000	0	0	0	0	50,324	249,676	0	0	16.8	(참고7) 명시
			춘포 오룡선 도로확포장	300,000	300,000	0	0	0	0	84,935	215,065	0	0	28.3	(참고8) 명시
			황등면 하동마을~동연지하차도 도로 개설공사	200,000	200,000	0	0	0	0	102,078	97,922	0	0	51.0	(참고9) 명시
			춘포 노적선 도로확포장공사	550,828	0	500,000	50,828	0	0	410,743	140,085	0	0	74.6	사고
			시군농어촌도로 확포장사업 추진	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	100
			시도31호 도로확포장 사업	6,191	0	0	6,191	0	0	6,191	0	0	0	100
			백제왕도 탐방로 조성(익산토성)	451,636	0	451,636	0	0	0	283,546	168,090	0	0	62.8	(참고10) 사고
			망성 신하선 도로확포장공사	100,000	100,000	0	0	0	0	34,000	66,000	0	0	34.0	(참고11) 명시
			오산 용연선 (모현동장례식장~용곤마을)도로확포장 사업	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	(참고12) 사고
			함라 행진선 도로확포장	449,400	400,000	49,400	0	0	0	66,731	382,669	0	0	14.8	(참고13) 명시
			삼기 만대선 (하나로~검지마을) 도로확포장공사	80,000	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	(참고14) 명시
			금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	(참고15) 명시
		지방도 도로확포장		1,115,446	1,015,000	100,446	0	0	0	729,055	386,391	0	0	65.4
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,115,446	1,015,000	100,446	0	0	0	729,055	386,391	0	0	65.4	(참고16) 명시
		철도건널목 개량사업		899,537	540,000	359,537	0	0	0	695,595	203,183	0	759	77.3
			황등지구 철도건널목 입체화사업	540,000	540,000	0	0	0	0	539,241	0	0	759	99.9
			평화육교재가설	359,537	0	359,537	0	0	0	156,354	203,183	0	0	43.5	(참고17) 사고
		주민숙원사업		36,280	36,280	0	0	0	0	26,799	0	0	9,481	73.9
			주민숙원사업	36,280	36,280	0	0	0	0	26,799	0	0	9,481	73.9
		교통관리개선사업		1,562,407	20,000	1,184,364	358,043	0	0	303,026	523,106	0	736,275	19.4
			용안 난포삼거리 위험도로 구조개선	20,000	20,000	0	0	0	0	17,745	0	0	2,255	88.7
			성당 삼회선 도로 구조개선사업	300,000	0	300,000	0	0	0	18,275	281,725	0	0	6.1	(참고18) 사고
			왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	358,043	0	0	358,043	0	0	30,534	0	0	327,509	8.5	(참고19)
			낭산~시명 선형개량사업	884,364	0	884,364	0	0	0	236,472	241,381	0	406,511	26.7	(참고20) 사고
		국도 도로확포장		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	512,861	487,139	0	0	51.3
			국도27호 대체우회도로 (서수~평장2)건설공사	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	512,861	487,139	0	0	51.3	(참고21) 명시
	도로기반유지			300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
		소규모주민숙원사업		300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
			남부권 순환형 힐링 보행로 조성	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	(참고22)명시
	하천정비			27,504,432	18,684,278	287,015	0	8,533,139	0	20,044,613	7,100,780	0	359,039	72.9
		하천 정비 및 유지관리		27,504,432	18,684,278	287,015	0	8,533,139	0	20,044,613	7,100,780	0	359,039	72.9
			지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	14,463,020	8,000,000	0	0	6,463,020	0	12,995,502	1,467,518	0	0	89.9	계속비
			지방하천정비(동면천)(전환사업)	5,070,119	3,000,000	0	0	2,070,119	0	1,870,567	3,199,552	0	0	36.9	(참고23) 계속비
			소하천정비(진사천)(전환사업)	1,449,872	1,300,000	149,872	0	0	0	156,993	1,292,879	0	0	10.8	(참고24) 명시 1,210,324 사고 82,555
			소하천정비(황각천)(전환사업)	200,000	200,000	0	0	0	0	54,943	145,057	0	0	27.5	(참고25)명시
			하천제방 유지보수(자체)	3,495,762	3,360,822	134,940	0	0	0	3,063,717	115,000	0	317,045	87.6	명시
			하천제방 유지보수	902,203	900,000	2,203	0	0	0	902,203	0	0	0	100
			국가하천유지보수(4대강)	392,000	392,000	0	0	0	0	392,000	0	0	0	100
			국가하천유지보수(4대강외)	228,000	228,000	0	0	0	0	228,000	0	0	0	100
			미불용지매입비(소하천)	25,000	25,000	0	0	0	0	11,163	0	0	13,837	44.7	(참고26)
			만경강 문화관	178,456	178,456	0	0	0	0	169,637	0	0	8,819	95.1
			국가하천 만경강 파크 골프장 증설사업	900,000	900,000	0	0	0	0	19,226	880,774	0	0	2.1	(참고27) 명시
			하천구역 출입 자동차단시설 설치사업	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100
			탑천 준설 및 제방법면정비사업	100,000	100,000	0	0	0	0	80,662	0	0	19,338	80.7
	재무활동 (건설과)			6,100	6,100	0	0	0	0	5,948	0	0	152	97.5
		보전지출		6,100	6,100	0	0	0	0	5,948	0	0	152	97.5
			시도비 보조금 반환금	6,100	6,100	0	0	0	0	5,948	0	0	152	97.5
	행정운영경비(건설과)			123,621	123,621	0	0	0	0	114,049	0	8,706	866	92.3
		인력운영비		89,759	89,759	0	0	0	0	80,246	0	8,706	807	89.4
			국가하천유지보수(인력운영비)	48,000	48,000	0	0	0	0	39,294	0	8,706	0	81.9
			만경강 문화관 (인력운영비)	41,759	41,759	0	0	0	0	40,952	0	0	807	98.1
		기본경비		33,862	33,862	0	0	0	0	33,803	0	0	59	99.8
			기본경비	33,862	33,862	0	0	0	0	33,803	0	0	59	99.8
	도로기반유지			8,327,836	6,619,720	1,179,185	528,931	0	0	6,063,811	1,831,014	13,473	419,538	72.8
		소규모주민숙원사업		7,477,395	6,024,720	923,744	528,931	0	0	5,791,025	1,253,359	13,473	419,538	77.4
			소규모주민숙원사업	1,182,480	1,143,480	39,000	0	0	0	1,181,385	0	0	1,095	99.9
			주민편익증진사업(보조)	80,000	0	80,000	0	0	0	78,377	0	0	1,623	98.0
			마을안길 노후도로 정비공사	4,383,566	3,708,500	308,193	366,873	0	0	3,628,312	575,144	0	180,110	82.8	명시 440,000 사고 135,144
			숭모공원~석치마을간 도로확포장공사	337,136	100,000	237,136	0	0	0	330,799	0	0	6,337	98.1
			지역밀착형참여사업 (마을안길)	582,155	522,740	59,415	0	0	0	363,180	205,502	13,473	0	62.4	(참고28) 명시 173,590 사고 31,912
			(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	712,058	550,000	0	162,058	0	0	208,972	472,713	0	30,373	29.3	(참고29) 명시
			하나로 교통혼잡 개선사업	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	(참고30)
		위험도로개선		850,441	595,000	255,441	0	0	0	272,786	577,655	0	0	32.1
			교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	850,441	595,000	255,441	0	0	0	272,786	577,655	0	0	32.1	(참고.31) 명시

(참 고) 2022년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원, %)

연번	세부사업명	예 산 액	지 출 액	비 율	부 진 사 유
1	금마갈산-서편간 도로확포장공사	942,593	525,400	55.7	‧ 토지협의보상 및 2차분 공사 추진중
2	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	77,913	0	0	‧ 전략환경영향평가용역 이행중
3	어양동 어곳~부평간 도로확포장	910,258	88,989	9.8	‧ 토지수용 이행(’22.03.~)
4	황등 도선-외화간 도로 확포장공사	400,000	170,423	42.6	‧ 2회추경 예산반영으로 공사 추진중
5	하나로~소간촌간 도로 확포장공사	500,000	39,480	7.9	‧ 하반기 특별교부세 교부(‘22.10.12.)로 토지 협의보상 추진중
6	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000	0	0	‧ 실시설계용역(환경, 재해영향평가 협의) 추진중
7	금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	300,000	50,324	16.8	‧ 토지 협의보상 추진중
8	춘포 오룡선 도로확포장	300,000	84,935	28.3	‧ 토지 협의보상 추진중
9	황등면 하동마을~동연지하차도 도로개설공사	200,000	102,078	51.0	‧ 실시설계용역(노선 협의 지연) 추진중
10	백제왕도 탐방로조성(익산토성)	451,636	283,546	62.8	‧ 미보상 토지 협의
11	망성 신하선 도로확포장공사	100,000	34,000	34.0	‧ 실시설계용역(노선 협의 중)
12	오산 용연선(모현동장례식장~ 용곤마을) 도로확포장 사업	100,000	0	0	‧ 실시설계용역(노선 협의 지연) 추진중
13	함라 행진선 도로확포장	449,400	66,731	14.8	‧ 토지 협의보상 추진중
14	삼기 만대선(하나로~ 검지마을)도로확포장공사	80,000	0	0	‧ 실시설계용역(노선 협의 지연) 추진중
15	금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	0	0	‧ 실시설계용역(환경, 재해영향평가 협의) 추진중

연번	세부사업명	예 산 액	지 출 액	비 율	부 진 사 유
16	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,115,446	729,055	65.4	‧ 토지 협의보상 추진중
17	평화육교 재가설	359,537	156,354	43.5	‧ 화장실 및 휴게실 설치 완료에 따른 집행 잔액
18	성당 삼회선 도로 구조개선사업	300,000	18,275	6.1	‧ 토지보상 협의(토지 수용 절차 이행)
19	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	358,043	30,534	8.5	‧ 토지 협의보상 추진중
20	낭산~시명 선형개량사업	884,364	236,472	26.7	‧ 토지 협의보상 추진중
21	국도27호 대체우회도로 (서수~평장2)건설공사	1,000,000	512,861	51.3	‧ 토지 협의보상 추진중
22	남부권 순환형 힐링 보행로 조성	300,000	0	0	‧ 특별조정교부금 교부(12월)에 따른 결산추경 편성
23	지방하천정비(동면천) (전환사업)	5,070,119	1,870,567	36.9	‧준공시기 미도래로 인한 미집행
24	소하천정비(진사천) (전환사업)	1,449,872	156,993	10.8	‧토지 협의보상 및 행정절차 추진중
25	소하천정비(황각천) (전환사업)	200,000	54,943	27.5	‧실시설계용역 및 행정절차 진행중
26	미불용지매입비 (소하천)	25,000	11,163	44.7	‧미불용지 보상요청 접수건 반영 집행
27	국가하천 만경강 파크 골프장 증설사업	900,000	19,226	2.1	· 실시설계 및 행정절차 (22. 7. ~ 23. 7) - 하천점용허가, 소규모환경영향평가 등 · 실시설계용역(38,453천원)(22. 7. 발주) · 공사시행: 23. 8. ~ 24. 10
28	지역밀착형참여사업 (마을안길)	582,155	363,180	62.4	‧ 하수도 공사구간 중첩, 토지사용승락 불가에 따른 예산이월
29	(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	712,058	208,972	29.3	‧ 특별조정교부금 교부(10월), 준공시기 미도래
30	하나로 교통혼잡 개선사업	200,000	0	0	‧ 주민의견 수렴에 따라 사업 추후 재검토 및 예산 용도변경 신청
31	교통사고 잦은곳 개선사업 (전환사업)	850,441	272,786	32.1	‧ 민원사항 반영으로 인한 관계기관 재협의

3. 2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

연번	시정․개선사항	조치(처리) 결과	비고
1	•시홈페이지 접수 민원처리 관련 ▸도로노선 변경 요청(황등 하동~동연지하차도) 민원 건에 대하여 지역 주민들의 의견을 종합적으로 검토하여 조속히 추진될 수 있도록 노력하기 바람.	▸도로노선 변경 요청에 대하여 지역주민들의 의견을 종합적으로 검토하여 노선 협의하였으며, 보상협의 등 사업이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠음.
2	•용안생태습지 유지관리 ▸용안생태습지를 국가정원으로 지정하고자 노력하고 있으나 국가정원 지정까지는 상당한 시간이 소요되는바, 국가정원 지정 전까지 시민들의 여가활동과 힐링공간으로써 이용에 지장이 없도록 시설물 유지관리에 만전을 다하기 바람. ▸용안생태습지에 백련·홍련, 갈대·억새가 혼합되어자라고 있어 경관상 좋지 않으므로 혼합되지 않도록 관리에 철저를 기하기 바람.	▸용안생태습지를 방문하는 시민들에게 불편함이 없도록 국가정원 지정시까지 유지관리에 최선을 다하겠음. ▸처음에는 종류에 따라 서식공간을 구분하여 조성하였는데 식물이 생육하고 번지면서 일부 혼종으로 자라는 구간이 있는 것으로 판단됨. 앞으로 주의해서 유지관리 하겠음.
3	•농어촌도로 확포장 사업 관련 ▸농어촌도로 확포장 공사가 당초 계획과 달리 15년 이상 장기간 소요되는 경우가 다반사로 신규사업은 지양하고 장기간 방치되어 있는 사업부터 우선 추진될수 있도록 예산의 집중과 선택이 이루어질수 있도록 노력하기 바람.	▸시 재정여건에 맞춰 진행중인 사업부터 예산 확보하여 마무리될 수 있도록 노력하겠음.
4	•만경강 불법 야영 및 취사 행위 관련 ▸만경강에 캠핑장이 없다보니 불법으로 텐트나 카라반을 설치하여 불법 취사와 캠핑이 만연하고 있어 이에 대한 적극적은 대처 방안을 마련하기 바람.	▸야영 및 취사가 적법 행위는 아니지만 만경강을 이용하는 시민을 위해서 여름철 홍수위 상승시 제한적으로 통제를 하고 있으며 만경강 유지관리에 문제가 없는 한도 내에서 지속적으로 관리해 나가겠음.
5	•집행잔액 및 명시이월예산 관련 ▸예산 집행 실적이 저조하여 집행잔액이 과도하게 발생되고 있으며 그에따라 명시이월 예산이 많이 발생하고 있는바, 예산의 효율성을 위하여 적정하게 예산이 편성되어 이월 예산이 최소화 될수 있도록 노력하기 바람.	▸사업비 확보 후에 토지주와 보상 협의하는데 토지가격 때문에 진행이 어려운 경우가 발생함. 사업착수와 동시에 토지수용절차를 진행하여 이월이 최소화될 수 있도록 노력하겠음.
6	•설계변경 관련 ▸공사추진시 설계변경이 많이 발생되고 있는바 추후 현장확인 등을 철저히 하여 설계변경이 최소화 되도록 노력하기 바라며, 용역사 실수로 설계가 누락된 경우 페널티를 부과하는 방안을 검토하기 바람.	▸용역 시 빠진 내용이 있는 경우가 없도록 세밀하게 부서에서 검토하겠으며, 과도하게 설계변경이 발생하지 않도록 노력하겠음.
7	•행정사무감사 보고서 작성 관련 ▸용역사업, 민간에 대한 보조금 집행내역에 예산액 대비 용역비, 집행액을 표시하여 집행현황을 확인할 수 있도록 서식을 변경하기 바람.	▸추후에는 용역사업 집행내역 작성시 예산액, 용역비, 집행액을 표기하여 작성하도록 하겠음.
8	•평화육교 화장실 및 주차장 관련 ▸화장실 칸막이가 투명유리로 설치되어 민원이 발생하고 있어 현장확인 후 개선하기 바라며, 화장실 옆에 주차장을 조성하여 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 조치하기 바람.	▸민원이 발생했던 화장실 유리를 불투명하게 개선 완료하였으며, 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 화장실 옆 주차장 조성 완료하였음.
9	•왕궁천 하천정비공사 관련 ▸왕궁천 2공구 공사 구간 내에 왕궁물류단지가 위치해 있고 코스트코가 들어올 예정으로 많은 사람들이 찾을 것으로 예상되는바, 보석박물관과 연결되어 통행할수 있도록 하천정비 사업에 반영하기 바람.	▸물류단지와 보석박물관으로 통행할 수 있는 폭 3m정도의 인도를 확보하겠음. ▸교통행정과 왕궁물류단지 관련부서 협의에 따른 의견제출(23.2.29.)
10	•지방하천 동면천 정비사업 관련 ▸동면천 하천정비를 해도 제방포장이 안되는 곳이 있으므로 영농편익 도모를 위해 제방이 포장될 수 있도록 노력하기 바람.	▸미포장 구간의 현장을 조사측량하고 관련부서와 협의하여 가능한 포장할 수 있도록 노력하겠음.
11	•미불용지 매입비 예산 관련 ▸미불용지 보상신청을 해도 예산 부족으로 인해 보상을 받지 못하는 경우가 발생하고 있어 민원인들의 불만이 야기되지 않도록 예산 확보에 노력하기 바람.	▸현재 미불용지 보상은 수시로 접수하고 있고, 예산 부족분에 대하여는 추경 및 다음년도 본예산에 반영하여 보상하고 있으며, 앞으로도 민원인 불편이 없도록 최선을 다하겠음.
12	•만경강 자전거도로 유지관리 ▸만경강 자전거도로 주변에 풀이 무성하게 자라 있어 자전거도로 이용자들이 많은 민원을 제기하고 있으므로 제초작업을 실시하여 민원이 해소될 수 있도록 노력하기 바람.	▸향후 예산 등의 여건을 반영하여 제초작업이 잘 시행될 수 있도록 노력하겠음.
13	•행정사무감사 보고서 작성 관련 ▸의회에서 요구한 보고서 작성양식에 맞게 보고서가 작성될수 있도록 시정하기 바람.	▸의회에서 요구한 보고서 양식에 맞게 작성하여 제출하겠음.
14	•하천 친수지역 폐기물 처리 및 유지관리 관련 ▸하천주변 주요 불법투기지역에 CCTV를 설치하기 전에 감시인력을 배치하여 선제적 대처할 수 있도록 노력하기 바람.	▸현재 공무직으로 구성된 하천 유지관리 및 감시요원이 있지만 주요 불법투기 지역에 대하여는 순찰 및 예찰활동을 강화해 불법투기를 방지하도록 노력하겠음.
15	•오산면 소재지 진입도로 확포장 공사 관련 ▸토지보상 지연 등으로 인해 공사가 지연되고 있어 조속한 사업추진을 위한 대책을 강구하기 바람.	▸오산면 소재지 진입도로 확포장 사업은 현재 토지매입 진행중(56%)이며, 보상비 예산을 추경 또는 본예산에 확보, 수용절차 진행하여 사업이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠음.
16	•2021년도 예산 편성 후 전액 미집행 사업 관련 ▸오산면 용연선 등 2개사업이 2021년도 예산에 신규편성 되었음에도 불구하고 예산 전액이 미집행된바, 사업추진이 원활하게 이루어질수 있도록 노력하기 바람.	▸오산 용연선 도로확포장사업은 주민들의 노선 협의 민원으로 설계가 중지되었으나, 노선이 협의되어 진행 중이며 보상협의 등 사업이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠음. ▸성당 삼산마을 회전교차로 설치사업은 토지주들의 보상 협의 불가로 수용재결 절차 진행 중이며, 사업이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠음.
17	•국도27호선 서수~평장간 대체우회도로 관련 ▸서수~평장간 대체우회도로 사업에 주민의견과 민원사항이 적극 반영될수 있도록 익산시에서 중재자 역할에 최선의 노력을 다하기 바람.	▸원활하고 조속하게 사업이 추진될 수 있도록 지역주민들의 의견을 적극적으로 수렴하여 익산지방국토관리청에 의견이 반영될 수 있도록 노력하겠음.
18	•지방하천 동면천 정비사업 관련 ▸동면천 하천정비 사업 추진이 지연되고 있으며 예산집행 실적도 저조한바, 공사가 조속히 추진될수 있도록 노력하기 바람.	▸국토부에서 전라북도로 지방하천 권한이양에 따라 행정절차등이 지연되었으며, 현재는 공사가 발주되어 사업추진 중.
19	•위원회 운영 관련 ▸소하천정비사업은 매년 추진되고 있으나 소하천관리위원회는 운영되지 않고 있어 효율적으로 운영 될수 있는 방안을 검토하기 바람.	▸소하천관리위원회 심의사항 미발생으로 위원회의 운영이 미비하였으나, 추후 종합계획 및 중기계획 등에 관한 심의사항 발생 시 위원회를 적극 운영하겠음.
20	•군도23호선 도로 확․포장사업 관련 ▸작년에 준공한 군도23호선 도로 선형이 기존도로에 맞춰 도로를 확장하다보니 굴곡이 심한 상황인바, 추후 도로확포장시 도로 선형도 개선될 수 있도록 설계에 반영하여 시공하기 바람.	▸군도 설계 시 도로 선형을 도로법 및 설계기준에 맞게 실시설계용역 시 철저하게 검토하여 도로 선형이 개선될 수 있도록 하겠음.
21	•평택~익산 서부내륙고속도로 주민협의체 관련 ▸서부내륙고속도로에 편입되는 토지에 대한 신속한 보상을 위해 부서에서 보상협의회를 구성해서 토지보상이 이루어질 수 있도록 노력하기 바람.	▸익산시 보상협의회 ‘22. 6. 구성하여 현재까지 총 2회 보상협의회 개최(’22. 11월, ’23. 1월) 하였으며 현재 감정평가 진행중임.
22	•만경강 친수시설 설치 ▸현재 만경강야외수영장 설치를 계획하고 있으나 캠핑장이나 펌프트랙도 많은 시민들이 이용할수 있는 시설이기 때문에 만경강에 설치될수 있도록 적극적인 대응책을 마련하기 바라며, 시의회와도 충분한 소통을 할수 있도록 하기 바람.	▸캠핑장 및 자전거와 관련된 활용성이 높은 친수시설에 대해 시의회와 충분한 소통과 교감이 이루어질 수 있도록 노력하겠음.
23	•탑천 자전거도로 방지턱 설치 관련 ▸탑천 자전거도로와 일반도로가 만나는 구간에 대하여 속도 감속을 위한 방지턱 설치를 검토하기 바람.	▸일반도로 통행차량이 감속할 수 있는 과속방지턱 등을 교통행정과와 협업하여 설치할 수 있도록 하겠음.
24	•하나로 교통혼잡 개선사업 관련 ▸일반산업단지 진입도로 개통에 따른 하나로 교통체증 및 혼잡 개선 예산이므로 당초 계획된 교통혼잡 개선을 위한 예산으로 사용하도록 조치 바람.	▸주민의견 수렴 결과 교통혼잡이 예상보다 심각하지 않으므로 현재로서는 도시미관을 위해 중앙분리대(화단)을 존치하고 추후 교통량을 분석해 재검토 하기로 하고 예산은 용도변경 신청.

4. 2022년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고
1	민원처리실태특정감사	민원처리지연 (민원 11일 지연 후 취하원 접수 처리) 골재선별 세척 등의 신고내용 이행 여부 확인 신청	민원처리 관련 법령 등을 준수하여 신속·공정한 민원처리를 통한 신뢰도 향상을 위해 노력하겠음.	익산시 감사위원회	감사 위원회 조치 결과 (주의)
2	민원처리실태특정감사	골재채취업등록신고 민원처리 부적정 -골재채취업등록적격여부심사회신전민원수리 (2건)	민원처리 관련 법령 및 개별법령을 준수하여 신속·공정한 민원처리를 위하여 노력하겠음.	익산시 감사위원회	감사 위원회 조치 결과 (주의)

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□

발언 의원 /발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
조규대 /제248회	∙지방도718호선 익산제4일반산업단지~황등 성일고간 L=2.5km구간 4차선 도로확포장	∙전라북도에서 추진하는 도로건설관리계획에 반영될 수 있도록 건의 요청하였으며, 지속적으로 전라북도 도로확장 수요조사 및 관련업무에 반영되도록 건의하겠음.
박철원 /제240회	∙비법정도로가 대부분 사유지임에도 불구하고 관행으로 지금까지 이용하고 있으며, 소유권의 변동 및 소유자의 재산권 행사시 주민의 불편함을 미연에 방지하고자 해당 도로의 편입토지를 매입	∙토지소유주는 토지를 매입하여 공사가 추진 될 수 있도록 요구하고 있으나 현실적으로 시에 산적해 있는 비법정도로를 매입하여 공사를 추진하기에는 재정여건상 어려울 것으로 판단되며 시급한 지역에 대하여는 토지주의 동의를 얻어 통행에 불편함이 없도록 안전시설 및 유지관리에 최선을 다하겠음.

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

【관리번호 : 246 - 2 – 2 】

일 시	2022. 9. 19 ~ 10. 7. (제246회 제1차정례회)	질문의원	조규대	답 변	시장
		설명일자	2022.10.6
제 목	원광대 부근 국도 23호선과 마한로7길 교차로의 선형개선			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( ○ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 원광대 부근 국도 23호선과 마한로7길 교차로의 선형개선
▣ 답 변 내 용 ◦ 원광대 부근 국도 23호선과 마한로 7길 교차로 선형개선은 도로교통공단의 교통사고 자료조사 및 원인분석을 통해 “2022년 교통사고 잦은 곳 개선사업”으로 선정되었으며, 우회도로 확보방안 및 용지매입 등을 다각적으로 검토할 계획임. ◦ 교통사고 빈발 교차로에 대한 전수조사는 익산 경찰서와 협의하여 실시할 계획이며, 도로교통공단 및 경찰서와 유기적인 협조체계를 통하여 교통안전 지수 향상 대책을 강구하도록 하겠음. ▣ 금 후 계 획 ◦ 유관기관 및 용지매입 등 협의 : 2022. 11.~ 2023. 4. ◦ 착공 및 준공(예정) : 2023. 5. ~2023. 9.

【관리번호 : 248 – 1 - 1】

일 시	2022.11.28. ~ 12.20. (제248회 제2차정례회)	질문의원	이중선	답 변	시 장
		설명일자	2023.1.11
제 목	만경강 목천지구 파크골프장 관리운영체계 정립 필요성			소관부서	건설과
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 만경강 파크골프장에 대해 관리 주체 및 운영체계에 대한 재정립 ◦ 시 홈페이지 체육시설예약시스템 도입·적용
▣ 답 변 내 용 ◦ 만경강 목천지구 파크골프장 시설관리는 건설과가 담당하고 시설 이용 및 운영은 체육진흥과에서 담당할 것임. ◦ 체육진흥과에서 2023년부터 현장 관리 인원 2명을 배치, 현장 예약을 원칙으로 예약 순서에 따라 시설을 이용하도록 하겠음. ▣ 금 후 계 획 ◦ 현장 예약제 운영 및 시설물 관리 : 2023. 2. ~ 12.

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

8. 주요사업 조서 (3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

									(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요			구분	예산액		집행액		잔액	집행률	비고
	계	77건				43,192,178		28,814,035		14,378,143	66.7
1	금마 갈산-서편간 도로확포장공사	· 사업기간: ‘19.1~’23.12. · 총사업비: 2,609,000 · 사 업 량: L=1.6km, B=8.0m			계	942,593		525,400		417,193	55.7
					본예산	900,000		482,807		417,193	53.6
					명시	42,593		42,593		0	100
2	삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	· 사업기간: ‘22.1~’25.12. · 총사업비: 3,780,000 · 사 업 량: L=1.55km, B=8.0m			본예산	500,000		422,118		77,882	84.4
3	춘포 토다리-덕동간 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘22.6 ㆍ총사업비: 1,540,000 ㆍ사 업 량: L=1.0km B=8.0m			본예산	790,000		774,505		15,495	98.0
4	금마 누동~신촌간 도로확포장	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘22.8 ㆍ총사업비: 980,000 ㆍ사 업 량: L=1.01km B=8.0m			본예산	400,000		371,850		28,150	93.0
5	군도 23호선 도로확포장공사 (과동마을 앞 유후부지 외 6개소 정비)	ㆍ사업기간: ’21.10~‘22.5 ㆍ총사업비: 191,361 ㆍ사 업 량: 진입로개설 4개소, 배수로 2개소 정비, 방음벽 1개소			명시	191,361		151,564		39,797	79.2
6	시군도 도로관리계획및 농어촌도로 기본계획 용역	ㆍ사업기간:‘19.11.~’23.7 ㆍ사업내용 - 군도(23개노선) 및 농어촌도로(254개노선) 기본계획(변경) 1식			명시	77,913		0		77,913	0
7	어양동 어곳~부평간 도로확포장	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘25.12 ㆍ총사업비: 3,100,000 ㆍ사 업 량: L=0.8km B=8.0m			계	910,258		88,989		821,269	9.8
					본예산	450,000		0		450,000	0
					명시	460,258		88,989		371,269	19.3
8	오산면 소재지 진입도로 확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.8~‘24.12 ㆍ총사업비: 5,000,000 ㆍ사 업 량: L=0.85km B=24.0m			계	1,107,142		988,338		118,804	89.3
					본예산	1,000,000		881,196		118,804	88.1
					사고	107,142		107,142		0	100
9	황등 도선-외화간 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.8~‘23.12. ㆍ총사업비: 800,000 ㆍ사 업 량: L=0.4km B=8.0m			본예산	400,000		170,423		229,577	42.6
10	오산역-상아마을간 병목구간 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘19.1~‘22.5 ㆍ총사업비: 250,000 ㆍ사 업 량: L=0.2km B=7.0~8.0m			본예산	50,000		49,672		328	99.3
11	하나로~소간촌간 도로 확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.8~‘24.6. ㆍ총사업비: 1,400,000 ㆍ사 업 량: L=0.6km B=8.0m			본예산	500,000		39,480		460,520	7.9
12	왕궁 양동마을 진입도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘22.6. ㆍ총사업비: 1,410,000 ㆍ사 업 량: L=0.6km B=8.0m			계	482,641		471,603		11,038	97.7
					본예산	430,000		418,962		11,038	97.4
					명시	52,641		52,641		0	100
13	춘포 창평마을 진입도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘24.12 ㆍ총사업비: 1,500,000 ㆍ사 업 량: L=0.7km B=8.0m			본예산	100,000		0		100,000	0
14	금마 신정-중왕간 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘24.12. ㆍ총사업비: 2,450,000 ㆍ사 업 량: L=1.2km B=8.0m			본예산	300,000		50,324		249,676	16.8
15	춘포 오룡선 도로확포장	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘24.12. ㆍ총사업비: 1,330,000 ㆍ사 업 량: L=0.55km B=8.0m			본예산	300,000		84,935		215,065	28.3
16	황등면 하동마을~동연지하차도 도로 개설공사	ㆍ사업기간: ‘19.9~‘24.12 ㆍ총사업비: 1,250,000 ㆍ사 업 량: L=0.6km B=8.0m			본예산	200,000		102,078		97,922	51.0
17	춘포 노적선 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘20.1~‘23.12 ㆍ총사업비: 1,300,000 ㆍ사 업 량: L=0.4km B=8.0m			계	550,828		410,743		140,085	74.6
					명시	500,000		359,915		140,085	72.0
					사고	50,828		50,828		0	100
18	백제왕도 익산토성 탐방로 조성	ㆍ사업기간: ‘20.8.~‘22.7 ㆍ총사업비: 1,355,000 ㆍ사 업 량: L=1.73km B=6.0m (포장폭 5.0m)			명시	451,636		283,546		168,090	62.8
19	망성 신하선 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘22.1~‘24.12 ㆍ총사업비: 1,000,000 ㆍ사 업 량: L=0.65km B=8.0m			본예산	100,000		34,000		66,000	34
20	오산 용연선 (모현동장례식장~용곤마을)도로확포장 사업	ㆍ사업기간: ‘21.1~‘24.12 ㆍ총사업비: 900,000 ㆍ사 업 량: L=0.6km B=8.0m			명시	100,000		0		100,000	0
21	함라 행진선도로확포장	ㆍ사업기간: ‘21.1~‘24.12 ㆍ총사업비: 2,070,000 ㆍ사 업 량: L=1.43km B=8.0m			계	449,400		66,731		382,669	14.8
					본예산	400,000		17,331		382,669	4.3
					명시	49,400		49,400		0	100
22	삼기 만대선 (하나로~검지마을) 도로확포장공사	ㆍ사업기간:‘22.1~‘24.12 ㆍ총사업비:1,200,000 ㆍ사 업 량:L=0.8km B=8.0m			본예산	80,000		0		80,000	0
23	금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	ㆍ사업기간: ‘22.1~‘24.12 ㆍ총사업비: 1,500,000 ㆍ사 업 량: L=0.6km B=8.0m			본예산	150,000		0		150,000	0
24	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	ㆍ사업기간: ‘18.1~‘24.12 ㆍ사업내용: 편입토지 및 지장물 보상			계	1,115,446		729,055		386,391	65.4
					본예산	1,015,000		628,609		386,391	61.9
					명시	100,446		100,446		0	100
25	평화육교재가설 (화장실 및 휴게실 설치공사)	ㆍ사업기간: ‘21.2~‘23.2 ㆍ총사업비: 359,000 ㆍ사 업 량: 화장실 및 휴게실 설치 1식			명시	359,537		156,354		203,183	43.5
26	성당 삼회선 도로 구조개선사업	ㆍ사업기간: ‘21.1~‘24.12 ㆍ총사업비: 400,000 ㆍ사 업 량: 회전교차로 설치 1식			명시	300,000		18,275		281,725	6.1
27	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	ㆍ사업기간: ‘19.9~‘24.12 ㆍ총사업비: 486,000 ㆍ사 업 량: 선형개량 L=0.5km, B=8.0m			사고	358,043		30,534		327,509	8.5
28	낭산~시명 선형개량사업	ㆍ사업기간: ‘20.1~‘23.12 ㆍ총사업비: 1,000,000 ㆍ사 업 량: 선형개량 L=0.2km, B=8.0m			명시	884,364		236,472		647,892	26.7
29	국도27호 대체우회도로 (서수~평장) 건설공사	ㆍ사업기간: ‘14~‘28 ㆍ총사업비: 18,500,000 ㆍ사업내용 - 동지역 편입토지 보상			본예산	1,000,000		512,861		487,139	51.3
30	모현동 배산사거리 교통사고 잦은곳 개선공사	⬝사업기간 : 21.11.22.~22.03.31. ⬝총사업비 : 52,004 ⬝사 업 량 : 교차로정비1식			명시	52,004		52,004		0	100
31	신동 영상미디어센터사거리 교통사고 잦은곳 개선공사	⬝사업기간 : 22.11.22.~22.01.20. ⬝총사업비 : 31,925 ⬝사 업 량 : 교차로정비1식			명시	31,925		31,925		0	100
32	어양동 중앙체육공원사거리 교통사고 잦은곳 개선공사	⬝사업기간 : 22.11.22.~22.01.10. ⬝총사업비 : 43,040 ⬝사 업 량 : 교차로정비1식			명시	43,040		43,040		0	100
33	황등면 정착2구 마을진입로 정비공사	⬝사업기간 : 22.04.05.~12.15. ⬝총사업비 : 44,530 ⬝사 업 량 : 옹벽설치 L=39m			명시	44,530		44,530		0	100
34	함열읍 동지하마을외 7개소 마을안길 정비공사	⬝사업기간 : 22.04.11.~05.16. ⬝총사업비 : 49,207 ⬝사 업 량 : 아스콘포장 A=8,564㎡			본예산	49,207		49,207		0	100
35	황등면 소산마을 도로 확장공사	⬝사업기간 : 22.04.11.~05.13. ⬝총사업비 : 36,070 ⬝사 업 량 : 콘크리트포장 A=61㎥ 아스콘포장 A=305㎡			본예산	36,070		36,070		0	100
36	용안면 성동마을외 5개소 마을안길 정비공사	⬝사업기간 : 22.04.18.~05.20. ⬝총사업비 : 34,887 ⬝사 업 량 : 아스콘포장 A=4,803㎡			본예산	34,887		34,887		0	100
37	용안면 덕용리 148-1번지 일원 도로확포장공사	⬝사업기간 : 22.04.22.~06.23. ⬝총사업비 : 68,828 ⬝사 업 량 : 보도포장 A=129㎡, 보강토옹벽 L=80m			본예산	68,828		68,828		0	100
38	황등면 보삼5마을외 5개소 마을안길정비공사	⬝사업기간 : 22.04.27.~05.25. ⬝총사업비 : 32,552 ⬝사 업 량 : 아스콘포장 A=4,883㎡			본예산	32,552		32,552		0	100
39	웅포 갓점마을, 성당 수산마을 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.05.10.~12.13. ⬝총사업비 : 52,084 ⬝사 업 량 : 콘크리트 포장 A=185㎡, 석축설치 107m			본예산	52,084		52,084		0	100
40	황등면 성내마을 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.05.12.~11.04. ⬝총사업비 : 57,393 ⬝사 업 량 : 콘크리트 포장 A=352㎡, 옹벽설치 L=31m			본예산	57,393		57,393		0	100
41	읍면동 마을안길보수 단가계약 8차	⬝사업기간 : 22.06.22.~08.31. ⬝총사업비 : 37,936 ⬝사 업 량 : 마을안길 유지보수 1식			본예산	37,936		37,936		0	100
42	읍면동 마을안길보수 단가계약 11차	⬝사업기간 : 22.09.07.~10.17. ⬝총사업비 : 37,555 ⬝사 업 량 : 마을안길 유지보수 1식			본예산	37,555		37,555		0	100
43	읍면동 마을안길보수 단가계약 13차	⬝사업기간 : 22.10.25.~12.26. ⬝총사업비 : 37,750 ⬝사 업 량 : 마을안길 유지보수 1식			본예산	37,750		37,750		0	100
44	용동면 용성마을 안길 확포장공사	⬝사업기간 : 22.10.31.~12.19. ⬝총사업비 : 41,770 ⬝사 업 량 : 콘크리트포장 A=244㎡, 아스콘포장 A=789㎡			본예산	41,770		41,770		0	100
45	망성면 화남마을 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.3.3.~6.19. ⬝총사업비 : 54,566 ⬝사 업 량 : 확포장공사 (L=156m,W=1.5~2.8m)			본예산	54,566		54,566		0	100
46	춘포면 덕실마을외 3개소 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.2.25.~6.13. ⬝총사업비 : 37,799 ⬝사 업 량 : 아스콘덧씌우기 A=7980㎡ 및 부대공 1식			본예산	37,799		37,799		0	100
47	춘포면 시전마을외 1개소 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.3.15.~5.24. ⬝총사업비 : 35,713 ⬝사 업 량 : 콘크리트포장 A=800㎡ 및 부대공 1식			본예산	35,713		35,713		0	100
48	낭산면 죽신마을외 10개소 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.4.11.~5.27. ⬝총사업비 : 38,665 ⬝사 업 량 : 아스콘덧씌우기 A=7480㎡ 및 부대공 1식			본예산	38,665		38,665		0	100
49	여산면 금곡마을외 3개소 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.5.11.~6.28. ⬝총사업비 : 35,020 ⬝사 업 량 : 확포장공사: (L=205m,W=0.5~1.5m)			본예산	35,020		35,020		0	100
50	금마면 서동공원 입구 인도개설공사	⬝사업기간 : 22.5.19.~7.29. ⬝총사업비 : 71,445 ⬝사 업 량 : 인도개설공사 L=72m 및 부대공 1식			본예산	71,445		71,445		0	100
51	읍면동 마을안길보수 단가계약 10차	⬝사업기간 : 22.7.29.~11.15. ⬝총사업비 : 37,367 ⬝사 업 량 : 무근 콘크리트 깨기 외 47종			본예산	37,367		37,367		0	100
52	삼기면 대제마을외 2개소 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.8.26.~10.14. ⬝총사업비 : 34,160 ⬝사 업 량 : 법면정비 L=100m, H=1.2~1.8m 및 부대공 1식			본예산	34,160		34,160		0	100
53	금마면 구룡마을 안길확포장공사	⬝사업기간 : 22.9.8.~11.2. ⬝총사업비 : 39,248 ⬝사 업 량 : 콘크리트확포장: L=50m, W=2.5~4m, 옹벽 L=50m, 부대공 1식			본예산	39,248		39,248		0	100
54	금마면 신기마을 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.10.14.~12.22. ⬝총사업비 : 58,912 ⬝사 업 량 : 콘크리트포장 L=285m, W=4m 및부대공 1식			본예산	58,912		27,000		31,912	45.8
55	춘포면 초삼마을 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.10.18.~12.2. ⬝총사업비 : 32,010 ⬝사 업 량 : 콘크리트확포장 및 법면정비 L=70m, H=1.2m~1.8m 및 부대공 1식			본예산	32,010		32,010		0	100
56	왕궁면 양동마을외 2개소 안길정비공사	⬝사업기간 : 22.11.3.~12.19. ⬝총사업비 : 42,427 ⬝사 업 량 : 가드레일 12경간 및 콘크리트포장 L=135m 및 부대공			본예산	42,427		42,427		0	100
57	금강동 매립장 진입로 정비공사	·사업기간 : 21.11.~ 22.2. ·총사업비 : 60,491천원 ·사 업 량 : 도로확포장 L=105m, B=8m			명시	60,491		60,491		0	100
58	삼기면 화초마을 진입로 확포장공사	·사업기간 : 20.6.~22.6. ·총사업비 : 70,303천원 ·사 업 량 : 진입로개설 L=113m, B=6m			명시	70,303		70,303		0	100
59	(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성공사	·사업기간 : 21.12.~22.10. ·총사업비 : 712,058천원 ·사 업 량 : 보행로조성 L=500m			계	712,058		208,972		503,086	29.3
					본예산	550,000		77,287		472,713	14.1
					사고	162,058		131,685		30,373	81.3
60	숭모공원~석치마을(2공구) 도로확포장공사	·사업기간 : 22.3.~22.11. ·총사업비 : 337,137천원 ·사 업 량 : 도로확포장 L=260m			계	337,137		330,799		6,338	98.1
					본예산	100,000		100,000		0	100
					명시	237,137		230,799		6,338	97.3
61	읍면동 마을안길 보수 단가계약 (9차)	·사업기간 : 22.6.~22.8. ·총사업비 : 39,283천원 ·사 업 량 : 마을안길보수 1식			본예산	39,283		39,283		0	100
62	읍면동 마을안길보수 단가계약 (12차)	·사업기간 : 22.9.~22.12. ·총사업비 : 39,864천원 ·사 업 량 : 마을안길보수 1식			본예산	39,864		39,864		0	100
63	읍면동 마을안길보수 단가계약 14차	·사업기간 : 22.11.~22.12. ·총사업비 : 37,826천원 ·사 업 량 : 마을안길보수 1식			본예산	37,826		37,826		0	100
64	지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	ㆍ사업기간:‘15.~‘23. ㆍ총사업비:47,368,000 ㆍ사업량:L=9.25㎞			계	14,463,020		12,995,502		1,467,518	89.9
					본예산	8,000,000		6,532,482		1,467,518	81.7
					계속비	6,463,020		6,463,020		0	100
65	지방하천정비(동면천)(전환사업)	ㆍ사업기간:‘17.~‘24. ㆍ총사업비:17,317,000 ㆍ사업량:L=3.05㎞			계	5,070,119		1,870,567		3,199,552	36.9
					본예산	3,000,000		469,456		2,530,544	15.6
					계속비	2,070,119		1,401,111		669,008	67.7
66	소하천정비(진사천)(전환사업)	ㆍ사업기간:‘21.~‘23. ㆍ총사업비:1,500,000 ㆍ사업량:L=0.68㎞			계	1,449,872		156,993		1,292,879	10.8
					본예산	1,300,000		89,676		1,210,324	6.9
					명시	149,872		67,317		82,555	44.9
67	소하천정비(황각천)(전환사업)	ㆍ사업기간:‘22.~‘24. ㆍ총사업비:2,000,000 ㆍ사업량:L=0.75㎞			본예산	200,000		54,943		145,057	27.5
68	하천제방 유지보수(자체)	ㆍ관내 소하천(102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식			계	3,495,762		3,063,717		432,045	87.6
					본예산	3,360,822		2,928,777		432,045	87.1
					명시	134,940		134,940		0	100
69	하천제방 유지보수	ㆍ관내 지방하천(187km) 유지보수 1식			계	902,203		902,203		0	100
					본예산	900,000		900,000		0	100
					명시	2,203		2,203		0	100
70	국가하천유지보수(4대강)	ㆍ국가하천 (금강, 강경천 24km) 유지관리 1식			본예산	392,000		392,000		0	100
71	국가하천유지보수(4대강외)	ㆍ국가하천(만경강18km) 유지관리 1식			본예산	228,000		228,000		0	100
72	만경강 문화관	ㆍ만경강문화관 운영 및 유지관리			본예산	178,456		169,637		8,819	95.1
73	국가하천 만경강 파크 골프장 증설사업	ㆍ국가하천(만경강) 파크골프장 18홀 증설사업			본예산	900,000		19,226		880,774	2.1
74	하천구역 출입 자동차단시설 설치사업	ㆍ하천구역 출입 자동 차단시설 1식			본예산	100,000		100,000		0	100
75	탑천 준설 및 제방법면 정비사업	ㆍ사업량 준설=3,747㎥ 조경석쌓기=40m			본예산	100,000		80,662		19,338	80.7
76	국가하천유지보수(인력운영비)	ㆍ공무직 1명 - 용안 생태 습지 유지 관리			본예산	48,000		39,294		8,706	81.9
77	만경강문화관(인력운영비)	ㆍ시간선택임기제다급 1명 - 전시 및 프로그램 운영			본예산	41,759		40,952		807	98.1

9. 2022년도 각종 민원(진정·건의·청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
건의	▸도로확포장에 관한 민원	임재규	-2공단사거리(LG화학) ~석암마을간 도로확포장(L=1.4km, B=5.0m → B=12.0m)	-해당 도로는 개인사유지 내 형성된 비법정 현황도로로, 도로확포장을 위해서는 법정도로 지정 여부 등 장기적 검토가 필요한 사항임.
진정	▸성당면 두동리 산 128 번지 비법정도로 내 개인사유지보상관련	배홍렬	-비법정도로 내 개인사유지 보상 요청	-비법정도로 내 개인사유지 수용과 보상에관한 법적근거가 없어 해당번지에 대한 보상이 어려움이 있음을 통보
다순관련	▸함라면 신대리 597-1번지 일원 마을 진입로 개설 관련	박능열 외 35인	-함라면 신대리 597-1번지 일원 마을 진입로 개설 공사 요구	-개인사유지가 포함되어, 토지사용승낙이나 기부채납이 선행 되어야할 사항임을 통보
진정	▸진사천 소하천정비 사업토지 수용반대	이*환 이*희	-하천에 토지 편입시 전답의 기능을 잃어서 토지편입 반대	-박스교 설치 및 잔여지 매수 등을 통해 영농활동 불편을 최소화 협의
진정	▸대판천 소하천구역선 변경요청	장*순	-삼기면 연동리 53, 54번지에 주택 신축을 위해 소하천(대판천)구역선을 폐지․변경요청	-소하천 구역의 변경․폐지하려는 경우에「소하천정비법」에 의해 해당 관리청과 협의를 거쳐 기초 및 광역 소하천관리위원회의 심의에서 결정되며, 향후 익산시 소하천 정비종합계획 수립시 검토 예정
진정	▸국유재산	홍철희	-사유지 내 물길 이전 또는 대토보상 (금마면 신용리 521-2)	-사유지 내 물길은 자연적으로 형성된 배수이며 인위적인 수로 변경 행위가 없어 원상복구 의무가 있다고 보기 어려우며 국유재산법 제27조 및 제40조에 따라 용도폐지 및 교환 등의 처분이 제한됨에 따라 민원인의 요구를 수용하기 어려움.

10. 기금 운용 관련

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□

□ 각종 위원회 설치 및 운영현황

(기준일 : 2022. 12. 31. / 단위 : 명, 횟수, 천원)

위원회명	설치근거	구성 인원	임기	연임 제한	운영횟수			수당지급현황
					계	대면	서면	예산액	지급액	불용액
소하천관리위원회	소하천정비법 제26조 (익산시 소하천관리 위원회 운영 규정)	7	3	없음		-	-		-	-

□ 회의록 공개 일자

해 당 사 항 없 음

□ 각종 위원회 명단

위원회명	직 위	소 속	소속기관 직위	성 명	위촉(임명)일	임 기	비고
익산시 소하천관리 위원회 (7명)	위원장	익산시	건설국장	이명천	‘21. 7. 7.	‘25. 3. 30.	당연직
	부위원장	익산시	건설과장	조규석	‘22. 11. 11.	‘25. 3. 30.	당연직
	위원	익산시	관광개발계장	임대성	‘22. 3. 31.	‘25. 3. 30.	위촉직
	위원	익산시	하천관리계장	이성철	‘22. 3. 31.	‘25. 3. 30.	위촉직
	위원	㈜한가람	대표	류양규	‘22. 3. 31.	‘25. 3. 30.	위촉직
	위원	(유)장흥건설기술공사	대표	이수정	‘22. 3. 31.	‘25. 3. 30.	위촉직
	위원	군산대	교수	이창경	‘22. 3. 31.	‘25. 3. 30.	위촉직

12. 용역사업 관련

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

										(단위 : 천원)
연번	구분	용 역 명		예산액	용역비	집행액	용역업체		납품 일자		용역기간	계약 방법	비고
	계	35건		3,502,611	1,110,751	548,358
1	기술용역	성당 삼산마을 군도7호선 회전교차로 설치공사 실시설계용역		20,306	18,275	18,275	㈜ 고엘		2022. 4.25.		2022.1.26. ~ 2022.4.25.	1인 수의
2	기술용역	망성 신하선 도로확포장공사 실시설계용역		55,470	48,717	34,000	㈜주한건설 기술단		-		2022.2.9. ~ 2022.6.30. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
3	기술용역	삼기 만대선 (하나로~검지마을)도로확포장공사 실시설계용역		42,190	37,044	0	㈜태원엔지니어링		-		2022.2.15. ~ 2022.7.6. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
4	기술용역	금마 농도303호 종구선 도로확포장공사 실시설계용역		34,560	30,444	0	㈜ 한가람		-		2022.2.21. ~ 2022.5.21. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
5	기술용역	함라 행진선 (농도301호) 도로확포장공사 재해위험성 검토 용역		8,250	8,000	8,000	한솔 산림 기술 사무소		2022. 4.13.		2022.3.21. ~ 2022.4.13.	1인 수의
6	폐기물 용역	금마 누동~신촌간 도로확포장공사 건설폐기물처리용역 (2차분)		2,702	2,650	2,650	(유) 다일 환경 산업		2022. 5.26.		2022.3.31. ~ 2022.5.26.	1인 수의
7	폐기물 용역	낭산농협~시명마을간 선형개량공사 건설폐기물처리용역		8,367	8,000	0	㈜에코건설 산업		-		2022.6.13. ~ 2023.2.21. (일시중지)	1인 수의
8	기술용역	신호~용남 위험도로 구조개선공사 외 2개소 도로구역결정, 지형도면 고시 용역		4,213	4,150	4,150	㈜태원 엔지니어링		2022. 12.15.		2022.6.14. ~ 2022.12.15.	1인 수의
9	일반용역	금마 농도303호 종구선 도로확포장공사 소규모재해영향평가 용역		32,501	28,475	0	㈜건설품질 시험원		-		2022.6.20. ~ 2022.9.17. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
10	기술용역	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사 소규모 환경영향평가용역		12,870	12,230	0	㈜ 한누리		-		2022.6.17. ~ 2022.10.5. (일시중지)	1인 수의
11	기술용역	금마 농도303호 종구선 도로확포장공사 소규모 환경영향평가 용역		13,002	12,360	0	㈜ 한누리		-		2022.6.17. ~ 2022.10.5. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
12	기술용역	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사 소규모 재해영향평가 용역		32,380	28,522	0	㈜건설 품질 시험원		-		2022.6.20. ~ 2022.9.17. (일시중지)	2인 이상 견적 수의
13	일반용역	평화육교버스 및 택시운송자 화장실 및 휴게실 BF 본인증 용역		7,590	7,211	0	환경 그룹 건축사 사무소청		2023. 2.15.		2022.7.8. ~ 2023.2.15.	1인 수의
14	폐기물용역	금마 갈산~서편간 도로확포장공사 (2차분) 건설폐기물처리용역		15,211	13,700	13,700	(유) 진영 환경		2022. 12.16.		2022.8.16. ~ 2022.12.16.	1인 수의
15	폐기물 용역	금마 갈산~서편간 도로확포장공사 (2차분) 임목폐기물 처리용역		8,492	8,100	8,100	(유) 해머		2022. 9.23.		2022.8.16. ~ 2022.9.23.	1인 수의
16	폐기물 용역	금마 누동~신촌간 도로확포장공사 건설폐기물 처리용역(추가분)		3,544	3,500	3,500	(유) 다일 환경 산업		2022. 8.26.		2022.8.23. ~ 2022.8.26.	1인 수의
17	일반 용역	금마 신정~중왕간 도로확포장공사 소규모 재해영향평가 용역		28,839	25,685	0	(유) 대도 엔지니어링		2023. 2.23.		2022.10.27. ~ 2023.2.23.	2인 이상 견적 수의
18	폐기물 용역	성당 삼산마을 군도7호선 회전교차로 설치공사 폐기물처리용역		8,580	8,200	0	㈜일진도시 환경		-		2022.12.13. ~ 2023.11.11.	1인 수의
19	기술용역	용안면 어울림센터 진입로 외 2개소 안길정비공사 실시설계용역		302,700	21,480	21,480	주식회사 유현이엔씨		2022. 12.15.		2021.1.27. ~ 2022.12.15	지역 제한	사고
20	기술용역	오산면 광양~ 신리마을간 도로확포장공사 외 3개소 실시설계용역		260,000	19,530	19,530	주식회사 태원엔지니어링		2022. 3.29.		2021.12.30. ~ 2022.3.29.	1인 수의	명시
21	기술용역	황등면 대성마을 도로확장공사 외 6개소 실시설계용역		274,300	14,100	14,100	(유) 장흥건설기술공사		2022. 4.20.		2022.3.17. ~ 2022.4.20.	1인 수의
22	기술용역	2022년 교통사고 잦은곳 개선공사 실시설계용역		595,000	19,580	19,580	㈜동운		2022. 6.3.		2022.4.26. ~ 2022.6.3.	1인 수의
23	기술용역	황각천 소하천정비사업 토질조사 용역		15,290	13,800	13,800	㈜주한건설 기술단		2022. 3.30.		2022.2.22. ~ 2022.7.16.	1인 수의
24	기술용역	황각천 소하천정비사업 실시설계 용역		82,286	82,285	41,143	주식회사 예한 엔지니어링		-		2022.3.7. ~ 2022.10.18.	2인 이상견적수의	사전 행정 절차
25	폐기물 용역	왕궁천 하천정비공사 (왕궁2지구) 건설폐기물처리용역		48,030	42,807	42,807	(유) 가나 환경		2022. 4.19.		2022.3.21. ~ 2022.7.19.	2인 이상견적수의
26	폐기물 용역	왕궁천 하천정비공사 (왕궁2지구) 건설폐기물 처리 용역		48,030	42,294	42,294	(유) 도형		2022. 7.26.		2022.5.13. ~ 2022.9.13.	2인 이상견적수의
27	폐기물 용역	왕궁천 하천정비공사 (왕궁2지구) 건설폐기물 처리용역 (2차분3회)		46,090	40,536	0	㈜ 유현테크		-		2022.8.17. ~ 2022.12.17.	2인 이상견적수의	일시정지(22.12.12.)
28	일반용역	동면천 하천정비공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 1차분		390,000	294,200	147,100	㈜ 평화 엔지니어링 외 1개사		-		2022.8.29. ~ 2023.1.31.	일반경쟁
29	기술용역	황각소하천 정비공사 소규모 환경영향평가 용역		15,433	14,000	0	㈜ 한누리		-		2022.9.15. ~ 2023.1.3.	1인 수의	관련 기관 협의
30	기술용역	동면천 하천정비사업 도시관리계획 (변경) 결정용역		13,700	12,600	12,600	㈜ 한가람		2022. 12.9.		2022.11.2. ~ 2022.12.11.	1인 수의
31	폐기물 용역	동면천 하천정비공사 건설폐기물 처리용역(1차분)		99,925	87,501	0	㈜ 류한 환경		-		2022.11.10. ~ 2023.4.10.	2인 이상견적수의	일시정지(22.12.9.)
32	일반용역	원수우안1지구 1호배수문 외 6개소 정밀안전점검 용역		40,000	31,922	31,922	㈜고엘		2022. 6.4		2022.4.6. ~ 2022.6.4	2인 이상 견적 수의
33	일반용역	2022년 상반기 강경우안제 외 6개소 정기안전점검 용역		12,760	11,400	11,400	㈜고엘		2022. 7.2		2022.5.4. ~ 2022.7.2	1인 수의
34	기술용역	만경강 야외수영장 타당성조사 및 기본계획 구상용역		20,000	19,000	19,000	주식회사 태원엔지니어링		2022. 12.3		2022.6.7. ~ 2022.12.3	1인 수의
35	기술용역	국가하천 만경강 파크골프장 증설사업 실시설계 용역		900,000	38,453	19,227	주식회사 한가람		-		2022.7.7. ~ 2023.7.	2인 이상 견적 수의	용역 중지 ‘22.11.

13. 인․허가 민원처리 관련 사항

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

										(단위 : 천원)
연번	사업명	예산액		계약액 (변경액)		계약자		계약 일자	변경 일자		공 사 기 간	변경사유
계	38건	39,070,894		12,013,766 (12,538,177)
1	군도23호 과동마을 앞 유휴부지외 6개소 정비공사	191,361		70,601 (74,212)		(유)제성건설 대표 정규철		2021. 12.20.	2022. 5.12		2021.12.22. ~ 2022.5.18.	농경지의 노면수 배제를 위한 측구 설치 등 현장여건 반영
2	백제왕도 익산토성 탐방로 법면 및 배수로 정비공사	451,636		32,543 (36,905)		(유)대길환경 대표 이원규		2022. 2.17.	2022. 7.14.		2022.2.17. ~ 2022.7.19.	농경지 진입로 설치 등 민원사항 반영
3	춘포 토다리~덕동간 덕실1길 100일원 지정폐기물 철거공사	790,000		3,800 (5,688)		㈜선진건설 대표 심경미		2022. 2.16.	2022. 2.24		2022.2.17. ~ 2022.2.25.	석면 비산 방지시설 설치 및 보험료 정산
4	춘포 토다리~덕동간 도로확포장공사 (2차분)	790,000		404,902 (425,920)		㈜금강건설산업 대표 김학범		2022. 2.11.	2022. 6.3.		2022.2.14. ~ 2022.6.13.	물가변동 등 반영
5	왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사 (3차분)	482,641		176,426 (199,650)		㈜금강건설산업 대표 김학범		2022. 3.31.	2022. 6.7.		2022.4.1. ~ 2022.6.10.	교통안전시설물 등 추가 반영
6	금마 누동~신촌간 도로확포장공사 (2차분)	400,000		116,861 (142,257)		㈜백마종합건설 대표 박승호		2022. 3.31.	2022. 8.22.		2022.3.31. ~ 2022.8.25.	농경지 진출입로 및 교통안전시설물 등 추가 반영
7	난포삼거리 회전교차로 교통섬 개선공사	20,000		11,000 (13,766)		㈜우리산업개발 대표 김미경		2022. 11.10.	2022. 12.7.		2022.11.14. ~ 2022.12.13.	회전교차로 경계석 재설치 및 보험료 정산 등
8	어양동 어곳~부평간 도로확포장공사 (1공구)	910,258		259,041 (246,519)		(유)유백건설 대표 유은수		2021. 5.20.	2022 12.12.		2021.5.24. ~ 2023.7.30.	골재량 조정 반영
9	신동 영상미디어센터 사거리 교통사고 잦은곳 개선공사	59,000		31,636 (31,925)		㈜신성토건		2021. 11.17	2022. 1.11.		2021.11.22.~ 2022.1.20.	지장물 추가 발생에 따른 토공 물량 증가
10	어양동 중앙체육공원 사거리 교통사고 잦은곳 개선공사	111,000		44,202 (43,040)		㈜여산건설		2021. 11.16.	2022. 1.7.		2021.11.22.~ 2022.1.10.	도로관리과 공사구간 제척
11	황등면 정착2구 마을진입로 정비공사	95,000		58,555 (44,530)		(합)신한건설		2022. 4.4.	2022. 12.12.		2022.4.4. ~ 2022.12.15.	토지사용승낙 철회로 인한 포장면적 감소
12	웅포 갓점마을, 성당 수산마을 안길정비공사	61,336		48,540 (52,084)		(유)비엘건설		2022. 5.9.	2022. 12.5.		2022.5.10. ~ 2022.12.13.	이장 및 주민의 추가 포장 요청
13	황등면 성내마을 안길정비공사	83,962		58,495 (57,393)		(유)송광토건		2022. 5.9.	2022. 11.2.		2022.5.12. ~ 2022.11.4.	이장 및 주민의 일부구간 포장 반대로 인한 포장면적 감소
14	망성면 화남마을 안길정비공사	60,000		53,248 (54,566)		유한회사 효동건설		2022. 3.2	2022. 3.23		2022.3.3. ~ 2022.3.28	이장 및 마을 주민의 추가 포장 공사요청
15	춘포면 시전마을외 1개소 안길정비공사	50,000		30,639 (35,713)		(유)한성건설		2022. 3.11	2022. 3.24		2022.3.15. ~ 2022.3.29	이장 및 마을 주민의 추가 포장 공사 요청
16	여산면 금곡마을외 3개소 안길정비공사	37,260		31,931 (35,020)		주식회사 신성토건 박중식		2022. 5.10	2022. 6.22		2022.5.11. ~ 2022.6.24	이장 및 마을 주민의 추가포장 공사 요청
17	금마면 서동공원 입구 인도개설공사	100,000		52,276 (71,445)		주식회사 토우 박황우		2022. 5.19	2022. 7.25		2022.5.19. ~ 2022.7.29	디자인울타리 및 인도폭 확장요청
18	춘포면 초삼마을 안길정비공사	84,500		31,669 (32,010)		유한회사 도담건설산업 최은희		2022. 10.14	2022. 11.2		2022.10.18.~ 2022.11.9	이장 및 마을 주민의 추가포장 공사 요청
19	왕궁면 양동마을외 2개소 안길정비공사	25,900		39,812 (42,427)		(유)다산종합건설 박진례		2022. 11.1	2022. 12.12		2022.11.3. ~ 2022.2.15	이장 및 마을 주민의 추가 포장 공사 요청
20	평화동 화정마을외 3개소 마을안길 정비공사	60,000		55,827 (46,021)		㈜여산건설 대표 임수정		2022. 4.4.	2022. 4.26.		2022.4.11. ~ 2022.5.13.	하수도 공사구간 제척
21	중앙동 행정복지센터 외 5개소 마을안길 정비공사	45,000		41,577 (36,598)		㈜보성건설 대표 김완수		2022. 3.23.	2022. 5.20.		2022.3.23. ~ 2022.4.29.	사유지 공사반대 민원에 따라 위치변경, 덧씌우기를 절삭덧씌우기로 변경
22	삼기면 화초마을 진입로 확포장공사	200,000		167,656 (193,726)		㈜대대종합건설 대표 최영숙		2020. 6.22.	2022. 5.4.		2020.6.23. ~ 2022.5.20.	노후수로관 교체요청 반영
23	영등 북문교회외 4개소 마을안길 정비공사	48,000		43,590 (34,868)		㈜영신건설 대표 김용복		2022. 4.12.	2022. 5.9		2022.4.15. ~ 2022.5.18.	하수도 공사구간 제척
24	오상마을외 3개소 마을안길 정비공사	115,000		109,038 (113,905)		㈜덕산건설 대표 전병곤		2022. 4.27.	2022. 5.27.		2022.4.28. ~ 2022.5.31.	도로옆 주택가 침수피해 방지를 위해 덧씌우기를 절삭덧씌우기로 변경
25	배산공원 입구외 1개소 마을안길 정비공사	53,000		46,464 (52,304)		(유)서아건설 대표 변수진		2022. 5.16.	2022. 6.18.		2022.5.16. ~ 2022.6.21.	도로옆 주택가 침수피해 방지를 위해 덧씌우기를 절삭덧씌우기로 변경
26	왕궁천 살보 어도설치공사	14,463,020		74,886 (89,289)		㈜성민건설		2022. 3.21	2022. 5.19		2022.3.17. ~ 2022.5.21.	살보 어도 접속부 연결 보강
27	왕궁천 하천정비공사 (왕궁1지구)	14,463,020		9,091,400 (9,457,700)		㈜시티 외 1개사		2019. 12.26	2022. 8.24		2020.1.30. ~ 2022.8.30	준공정산, 물가변동(ES) 반영
28	2022년 어량천 하천준설공사	100,000		85,013 (107,140)		브살렐건설 주식회사		2022. 3.25	2022. 4.28		2022.3.28. ~ 2022.6.8.	사토장위치 및 운반거리 변경, 보혐료 등 실정산 반영
29	2022년 탑천 하천준설공사	150,000		132,113 (144,980)		유한회사 세현건설		2022. 3.31.	2022. 4.26		2022.4.4. ~ 2022.6.15	민원처리를 위한 준설구간 추가 및 운반거리 변경, 보혐료 등 실정산 반영
30	2022년 대조천 하천준설공사	100,000		88,990 (96,756)		유한회사 행중개발		2022. 4.12	2022. 5.17		2022.4.13. ~ 2022.6.24	노견토추가제거 사토장운반거리변경 보험료등실정산반영
31	여산면 호월천 제방보수공사	900,000		17,549 (23,140)		태광건설(주)		2022. 4.1	2022. 5.20		2022.4.6. ~ 2022.6.4.	시공높이 증가에 따른 물량변경 PE빗물받이 설치
32	호월천 하천준설공사	900,000		87,311 (63,418)		유한회사 태강건설		2022. 4.15	2022. 5.25		2022.4.19. ~ 2022.6.30	사토장 선정에 따른 운반거리변경 보험료등실정산반영
33	죽청천 제방포장공사	220,000		73,584 (73,694)		(유)장원건설		2022. 4.6	2022. 6.17		2022.4.8. ~ 2022.6.20.	차량교행을 위한 대기 공간 위치 및 개소 변경 기존 콘크리트포장 깨기 및 폐기물 처리 반영, 보험료등 실정산 반영
34	강경천 하천준설공사	900,000		84,927 (84,513)		㈜정해건설		2022. 4.15	2022. 6.28		2022.4.19. ~ 2022.6.30.	준설연장 및 사토량 증가 사토장선정에 따른 운반거리 변경 보혐료 등 실정산 반영
35	용안생태습지 초화류 광장 배수로 공사	250,000		19,500 (22,286)		(유)우승건설		2022. 8.31	2022. 9.22		2022.9.6. ~ 2022.9.30	배수불량 구간 순성토 반입 및 배수관연장
36	용안생태습지 데크광장 보수공사	300,000		75,565 (84,798)		(유)온누리 조경개발		2022. 9.21	2022. 11.3		2022.9.26. ~ 2022.12.5	방부목재, 마루틀 설치 반영 관급자재물량증가 보험료 등 실정산 반영
37	탑천 준설 및 제방법면 정비사업	100,000		87,319 (82,676)		유진토건 주식회사		2022. 10.17	2022. 11.10		2022.10.19. ~ 2022.12.27	조경석 쌓기물량 감소 하천준설 연장 추가 반영 수목제거 및 임목 폐기물 반영 보험료등 실정산
38	기양천 제방보수공사	900,000		75,280 (85,295)		유한회사 세현건설		2022. 4.12.	2022. 11.23		2022.4.13. ~ 2022.12.15	우기철 사면 유실 발생하여 추가시공 보험료 등 실정산 반영

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

8번항목 주요사업 조서와 같음

16. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				비고
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비	잔액	집행률
합 계	24,830,345	12,007,772.5	5,465,104.5	7,357,468	17,491,133	5,123,852	2,731,786.5	9,635,494.5	7,339,212	70.4
왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	358,043	179,021.5	-	179,021.5	30,534	15,267	-	15,267	327,509	8.5
낭산~시명 선형개량사업	884,364	442,182	-	442,182	236,472	118,236	-	118,236	647,892 (이월액 241,381 포함)	26.7
지방하천정비(왕궁천) (전환사업)	14,463,020	7,231,510	2,892,604	4,338,906	12,995,502	3,372,640	1,349,057	8,273,805	1,467,518	89.9
지방하천정비(동면천) (전환사업)	5,070,119	2,535,059	1,014,024	1,521,036	1,870,567	878,482	351,393	640,692	3,199,552	36.9
하천제방 유지보수	902,203	-	451,101.5	451,101.5	902,203	-	451,101.5	451,101.5	0	100
국가하천유지보수 (4대강)	392,000	392,000	-	-	392,000	392,000	-	-	0	100
국가하천유지보수 (4대강외)	228,000	228,000	-	-	228,000	228,000	-	-	0	100
국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	900,000	900,000	-	-	19,227	19,227	-	-	880,773	2.1
하천구역 출입 자동차단시설 설치사업	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	0	100
탑천 준설 및 제방 법면정비사업	100,000	-	100,000	-	80,662	-	80,662	-	19,338	80.7
지역밀착형참여사업 (마을안길)	582,155	-	582,155	-	363,180	-	363,180	-	218,975 (반납예정 13,473)	62.4
교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)	850,441	-	425,220	425,221	272,786	-	136,393	136,393	577,655	23.1

18. 지방보조금 성과평가 내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

19. 2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 이월사업 개요	42건 / 6,087,484천원

▶ 명시이월                                        : 31건 / 5,036,349천원

▶ 사고이월                                        : 11건 / 1,051,135천원

□ 명시이월사업

(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
	계	31건	5,036,349	2,701,811	2,334,538	53.6
1	금마 갈산-서편간 도로확포장공사	L=1.6km B=8.0m	42,593	42,593	0	100
2	군도 23호선 도로 확포장공사 (과동마을 앞 유휴부지 외 6개소 정비공사)	진입로 개설 4개소, 배수로 정비 2개소, 방음벽 1개소	191,361	151,564	39,797	79.2
3	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	군도 및 농어촌도로 기본계획(변경) 1식	77,913	0	77,913	0
4	어양동 어곳~부평간 도로확포장	L=0.8km B=8.0m	460,258	88,989	371,269	19.3
5	왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사	L=0.6km B=8.0m	52,641	52,641	0	100
6	춘포 노적선 도로확포장공사	L=0.4km B=8.0m	500,000	359,915	140,085	72.0
7	백제왕도 익산토성 탐방로 조성	L=1.73km B=6.0m (포장폭 5.0m)	451,636	283,546	168,090	62.8
8	오산 용연선 (모현장례식장~ 용곤마을) 도로확포장 사업	L=0.6km B=8.0m	100,000	0	100,000	0
9	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	49,400	49,400	0	100
10	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	편입토지 및 지장물 보상	100,446	100,446	0	100
11	평화육교 재가설 (화장실 및 휴게실 설치공사)	화장실 및 휴게실 설치 1식 (BF본인증 포함)	359,537	156,354	203,183	43.5
12	성당 삼회선 도로 구조개선사업	회전교차로 설치 1식	300,000	18,275	281,725	6.1
13	낭산~시명 선형개량사업	L=0.2km B=8.0m	884,364	236,472	647,892	26.7
14	황등면 신정마을 안길정비공사	아스콘포장 A=720㎡	12,300	12,300	0	100
15	웅포면 갓점마을 안길확포장공사	콘크리트포장 A=100㎡, 석축설치 39m	16,800	16,800	0	100
16	황등면 정착2구마을 진입로 정비공사	옹벽설치 L=39m	95,000	80,936	14,064	85.2
17	용안면 교동마을 안길정비공사	아스콘포장 A=78㎡ 흄관설치 L=74m	50,000	50,000	0	100
18	교통사고잦은곳개선사업	교차로개선1식	255,441	255,441	0	100
19	왕궁면 발산리 도로확포장공사	콘크리트확포장 L=44m	30,000	28,377	1,623	94.6
20	망성면 제내마을 마을안길정비공사	아스콘덧씌우기 A=2,188㎡	44,778	44,778	0	100
21	창인성당 뒷골목 안길정비공사	아스콘덧씌우기 A=200㎡	9,000	8,994	6	99.9
22	탑천 도로 아스콘덧씌우기	콘크리트포장 A=150㎡	15,000	15,000	0	100
23	부송동 도로 아스콘덧씌우기	아스콘덧씌우기 A=500㎡	15,000	15,000	0	100
24	금강동 매립장 진입로 확포장공사	도로확포장 L=105m, B=8m	89,314	89,314	0	100
25	숭모공원~석치마을간 도로확포장공사	도로확포장 L=320m	237,137	230,799	6,338	97.3
26	하나로 교통혼잡 개선사업	교통혼잡개선 1식	200,000	0	200,000	0	용도변경 신청
27	소하천정비(진사천)(전환사업)	⦁사업기간:‘21.~‘23. ⦁총사업비:1,500,000 ⦁사업량:L=0.68㎞	149,872	67,319	82,553	44.9
28	하천제방 유지보수(자체)	관내 소하천(102km) 유지보수 1식	134,940	134,940	0	100
29	하천제방 유지보수	왕궁천 수목제거공사	2,203	2,203	0	100
30	목천로 도로 덧씌우기 공사		50,000	50,000	0	100	도로관리과 도로관리계 (조직개편)
31	인화동 도로포장		59,415	59,415	0	100	도로관리과 도로관리계 (조직개편)

□ 사고이월사업

(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
	계	11건	1,051,135	600,382	450,753	57.1
1	오산면 소재지 진입도로 확포장공사	L=0.85km B=24.0m	107,142	107,142	0	100
2	춘포 노적선 도로확포장공사	L=0.4km B=8.0m	50,828	50,828	0	100
3	시도31호 도로확포장사업	타당성조사 1식	6,191	6,191	0	100
4	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	L=0.5km B=8.0m	358,043	30,534	327,509	8.5
5	용안면 어울림센터 진입로 개설공사	진입로 개설 1식	200,000	111,322	88,678	55.7
6	삼기면 화초마을 진입로 확포장공사	진입로개설 L=113m, B=6m	89,748	85,973	3,775	95.8
7	석탄동 고제마을 안길정비공사	법면정비 L=30m, 콘크리트포장 18㎥	15,584	15,584	0	100
8	삼성동 신화마을 가드레일설치공사	가드레일 설치 L=200m	15,575	15,575	0	100
9	읍면동 마을안길보수 단가계약(10차)	마을안길보수 1식	26,435	26,017	418	98.4
10	오산면 광양~신리마을간 도로확포장공사 외 3개소실시설계용역	실서설계용역 1식	19,531	19,531	0	100
11	(구)농업진흥원 일원 힐링보행로조성	보행로 조성 L=500m	162,058	131,685	30,373	81.3

20. 2023년도 명시이월 내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

							(단위 : 천원)
연번	사 업 명	예산액		지출액		이월액		이월사유	비고
계	36건	17,021,121		7,835,928		8,238,951
1	금마 갈산-서편간 도로확포장공사	942,593		525,400		417,193		장기계속공사 추진에 따른 준공시기 미도래	‘23.12월 준공예정
2	삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	500,000		422,118		77,882		토지 협의 보상 추진
3	어양동 어곳~부평간 도로확포장	910,258		88,989		450,000		토지 협의 보상 및 수용 재결	‘22 사고 371,269
4	오산면 소재지 진입도로 확포장공사	1,107,142		988,338		118,804		토지 협의 보상 추진
5	황등 도선-외화간 도로 확포장공사	400,000		170,423		229,577		장기계속공사 추진에 따른 준공시기 미도래	‘23.12월 준공예정
6	하나로~소간촌간 도로 확포장공사	500,000		39,480		460,520		토지 협의 보상 추진
7	춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000		0		100,000		실시설계용역 (환경,재해영향평가)추진	‘23.6월 용역완료
8	금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	300,000		50,324		249,676		토지 협의 보상 추진
9	춘포 오룡선 도로확포장	300,000		84,935		215,065		토지 협의 보상 추진
10	황등면 하동마을~동연지하차도 도로개설공사	200,000		102,078		97,922		실시설계용역 (노선 협의 지연) 추진	‘23.5월 보상협의
11	망성 신하선 도로확포장공사	100,000		34,000		66,000		설계용역 추진 (노선결정지연)	‘23.7월 용역완료
12	함라 행진선 도로확포장	449,400		66,731		382,669		토지 협의 보상 추진
13	삼기 만대선 (하나로~검지마을)도로 확포장공사	80,000		0		80,000		실시설계용역 (노선 협의 지연) 추진	‘23.7월 용역완료
14	금마 농도 303호 종구선 도로확포장공사	150,000		0		150,000		실시설계용역 (환경,재해영향평가)추진	‘23.6월 용역완료
15	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	1,115,446		729,055		386,391		토지 협의 보상 추진
16	국도27호 대체우회도로(서수~평장2)건설공사	1,000,000		512,861		487,139		토지 협의 보상 추진
17	군도1호(오산초등학교일원)도로정비공사	45,000		0		45,000		동절기 공사중지	도로관리과
18	오산면 신중마을 외 4개소 철도건널목 정비공사	100,000		0		100,000		철도공단 토지 사용 협의중 23년 상반기 공사 시행	‘23.6월 준공예정
19	읍면동 마을안길보수 단가계약	800,000		500,000		200,000		2회추경(7월) 예산편성 준공시기 미도래	‘23.6월 준공예정
20	성당면 내난마을 가드레일 설치공사	15,000		0		15,000		특별조정교부금 교부(10월) 준공시기 미도래	‘23.6월 준공예정
21	낭산면내성마을 안길정비공사	30,000		0		30,000		특별조정교부금 교부(10월) 준공시기 미도래	‘23.6월 준공예정
22	춘포면 갈전마을 안길정비공사	30,000		0		30,000		특별조정교부금 교부(10월) 준공시기 미도래	‘23.6월 준공예정
23	(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	712,058		208,972		472,713		특별조정교부금 교부(10월) 준공시기 미도래	‘23.7월 준공예정
24	용제동 신촌마을 진입로 확장공사	40,000		0		40,000		토지사용 승낙서 징구 지연 23년 상반기 위치변경 추진	‘23.6월 준공예정
25	팔봉동 원팔봉마을 도로 옹벽설치	20,000		0		20,000		토지사용 승낙서 징구 지연 23년 상반기 위치변경 추진	‘23.6월 준공예정
26	은기동 은원마을 마을안길 확포장공사	50,000		0		50,000		토지사용 승낙서 징구 지연 준공시기 미도래	‘23.3월 준공
27	인북로12길 16일원 마을안길정비	22,400		0		22,400		하수도 공사구간 중첩되어 23년 상반기 공사 시행	‘23.6월 준공예정
28	주현로1길 10일원 마을안길정비	23,400		0		23,400		하수도 공사구간 중첩되어 23년 상반기 공사 시행	‘23.6월 준공예정
29	중앙로4길 13-1일원 마을안길정비	17,790		0		17,790		하수도 공사구간 중첩되어 23년 상반기 공사 시행	‘23.6월 준공예정
30	2022년 교통사고 잦은곳 개선사업	595,000		17,345		577,655		토지매입협의추진	‘23.12월 준공예정
31	남부권 순환형 힐링 보행로 조성	300,000		0		300,000		특별조정교부금 교부(12월) 결산추경 예산편성	‘23.1월 용역발주
32	왕궁면 안림마을 안길정비공사	20,000		0		20,000		특별조정교부금 교부(12월) 준공시기 미도래	‘23.6월 준공예정
33	소하천정비(진사천)(전환사업)	1,449,872		156,993		1,210,324		행정 절차 및 토지보상 협의 지연	`22사고 82,555
34	소하천정비(황각천)(전환사업)	200,000		54,943		145,057		실시설계용역 및 행정절차 진행
35	하천제방 유지보수(자체)	3,495,762		3,063,717		115,000		하반기 민원발생 및 추경 예산편성으로 공사 미완료	잔액 317,045
36	국가하천 만경강 파크 골프장 증설사업	900,000		19,226		880,774		실시설계 및 행정절차 진행 (22.7 ~ 23. 7) 착공 및 준공: 23. 8.~24. 6.

21. 2023년도 명시이월(의회 제출) 후 2022년도에 집행한 내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

22. 예산 이용, 전용 및 예비비 집행 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

24. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로기반계장		이인성	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 2022년도 반납건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계		132,500		5,914
2021주민참여예산(영등1동 밝은마을 만들기사업)		80,000		3,618	집행잔액
2021주민참여예산(용안면 덕용마을 외 9개소 보안등 설치)		12,500		830	집행잔액
2021 주민참여예산 (동산동 명소 안내그리기)		40,000		1,466	집행잔액

□ 2023년도 반납예정건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 예 정 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	48,000	522,740	8,706	13,473
2022년 지역밀착형 참여사업 (마을안길)	0	522,740	0	13,473	집 행 잔 액
국가하천유지보수 (인력운영비)	48,000	0	8,706	0	국비 내시 지연으로(3월) 1~3월 급여 행정지원과 지급으로 반납분 발생

26. 2022년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

27. 2022년도 계획사업중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

28. 2022년도 이월사업중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

29. 2022년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	예산액	집행액	잔 액	미집행사유 및 금후계획
1	시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	77,913	0	77,913	▸전략환경영향평가용역 진행중(‘21.2.~)으로 환경청 협의 후 의견 반영하여 기본정비계획 완료 예정 ▸환경청 협의 2023.5. ▸기본계획용역 완료 2023.7.
2	오산 용연선 (모현동장례식장~용곤마을) 도로확포장공사	100,000	0	100,000	▸편입토지 소유자 민원에 따른 노선 협의 지연 ▸설계용역 완료 2023. 5. ▸보상 협의 2023. 6.
3	삼기 만대선 (하나로~검지마을) 도로확포장공사	80,000	0	80,000	▸실시설계용역 중 (주민 민원에 따른 노선 협의 지연) ▸설계용역 완료 2023. 7. ▸보상 협의 2023. 8.
4	금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	0	150,000	▸실시설계 및 환경영향평가 용역 추진중(‘22.2.~) ▸2개 용역 완료 2023. 6. ▸보상 협의 2023. 8.

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□

(단위 : 천원)

연번	세부사업	통계목	예산액	변경액		집행액	변경 사유	비고
				감	증
1	지방하천정비(왕궁천) (전환사업)	401-01 시설비 및 부대비 (시설비)	7,575,601	272,520	-	6,215,915	동절기 중지로 인한 건설사업 관리용역기간이 연장되어 용역비 증가 (시설비→감리비 변경)	본예산 5,998,121 2회추경 1,577,480
	지방하천정비(왕궁천) (전환사업)	401-02 시설비 및 부대비 (감리비)	422,520	-	272,520	314,750		본예산 0 2회추경 422,520

31. 소송 사건 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

사 건 명 (사건번호)	사건개요	원고	피고	접수일	추진사항 (판․종결일)
공사대금 청구 소송 (2022가합 540911)	▸평화육교 재가설공사 추진 중 대체우회도로공사로 인하여 공사기간이 연장되었으며, 이에 대한 추가간접비에 대하여 소송 제기	현대 건설 주식 회사 외 1명	국가 철도 공단 (익산시)	2022.9.21	-

32. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 민원접수 현황

관 련 민 원	시 정 에 바 란 다		비 고
	접 수(건)	처 리(건)
계	11	11
도로확포장 및 회전교차로 설치 관련 민원	3	3
하천관련민원	8	8	시정에바란다

□ 주요처리현황

◦ 망성면 신작교차로 회전교차로 설치 요청

▸전라북도 회전교차로 중장기 기본계획에 반영 요청함(2022.2.)

◦ 과속방지턱 개선 요청(백제왕도 탐방로 조성(익산토성))

▸백제왕도 탐방로 개선공사에 과속방지턱 개선하여 설치 완료(2022.6.)

◦ 도로포장면 단차 조정 요청(오산역~상아마을간 도로확포장)

▸기존 도로와 확장구간 도로 포장면의 단차 조정 완료(2022.5.)

◦ 만경강 친수 지역 폐기물 처리 및 유지관리 요청

▸정기적인 환경정비, 불법 행위 단속 등을 실시하여 만경강 친수지역의 쾌적한 환경을 유지하겠음.

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

36. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

해 당 사 항 없 음

감사자료 과 요구사항

1. 2022년도 시･군도 농어촌도로 확·포장 사업

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

□ 진행중인 시군도 및 농촌도로 현황(이월 및 계속사업)

										(단위 : 백만원)
연번	사 업 명	사업개요		예 산 액							추진실적	노선명	비고
				총 사업비		기투자		2022년 예산액	금후 투자
계	27개사업			41,021		15,025		8,065	17,931
1	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m		2,609		879		900	830		공사중 70%	금마 101 (서삼선)
2	삼성 하나로~외화간 도로확.포장	L=1.55km B=8.0m		3,780		730		500	2,550		보상중 65%	시도1201호
3	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m		1,540		750		790	0		준공	춘포 103 (신화선)
4	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=1.01km B=8.0m		980		580		400	0		준공	금마 102 (누부선)
5	군도23호선 도로확.포장 (과동마을 앞 유휴부지 외 6개소 정비공사)	진입로 개설 4개소, 배수로 정비 2개소, 방음벽 1개소		191		191		0	0		준공	군도23호
6	어양동 어곳~부평간 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m		3,100		2,150		450	500		보상중 92% 및 공사중 25%	시도1268호
7	오산면소재지 진입 도로확.포장	L=0.85km B=24.0m		5,000		1,100		1,000	2,900		보상중 56%	군도2호
8	황등 도선~외화간 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m		800		400		400	0		공사중 80%	황등 104 (황팔선)
9	오산역 –상아마을간 도로확.포장	L=0.2km B=8.0m		250		200		50	0		준공	오산 203 (신수선)
10	하나로~소간촌간 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		1,400		600		500	300		보상중 92%	삼기 203 (석라선)
11	왕궁 양동마을 진입 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		1,410		980		430	0		준공	왕궁 207 (양곡선)
12	춘포 창평마을 진입 도로확.포장	L=0.7km B=8.0m		1,500		100		100	1,300		용역중	춘포 203 (창평선)
13	금마 신정~중왕간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m		2,450		600		300	1,550		보상중 55%	금마 202 (서오선)
14	춘포 오룡선 도로확.포장	L=0.5km B=8.0m		1,330		130		300	900		보상중 39%	춘포 102 (오룡선)
15	황등 하동마을~ 동연지하차도간 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		1,250		500		200	550		보상중 40%	황등 212
16	춘포 노적선 도로확.포장	L=0.4km B=8.0m		1,300		700		0	600		공사중 5%	춘포 311 (노적선)
17	백제왕도 익산토성 탐방로조성	L=1.73km B=6.0m (포장폭 5.0m)		1,355		1,355		0	0		준공	금마 205
18	망성 신하선 도로확,포장	L=0.65km B=8.0m		1,000		0		100	900		용역중	망성201호 (신하선)
19	오산용연선 (모현장례식장~용곤마을) 도로확.포장	L=0.6km B=8.0m		900		100		0	800		용역중	오산 301 (용연선)
20	함라행진선 도로확.포장	L=1.43km B=8.0m		2,070		100		400	1,570		보상계획열람공고	함라 301 (행진선)
21	삼기 만대선 (하나로~검지마을) 도로확.포장	L=0.8km B=8.0m		1,200		0		80	1,120		용역중	삼기208호 (만대선)
22	금마 농도303호 종구선 도로확.포장	L=1.43km B=8.0m		1,500		0		150	1,350		용역중	금마303호 (종구선)
23	하나로~4산단간 지방도 도로확.포장	보상비		2,200		1,074		1,015	111		수용완료	지방도 718
24	용안 난포삼거리 위험도로 구조개선 (교통섬 개선공사)	회전교차로 교통섬 개선		20		20		0	0		준공	지방도706
25	성당삼회선 도로구조개선사업	회전교차로 1식		400		300		0	100		보상중	군도 7호	특교 300
26	왕궁 신호~용남 위험도로 구조개선	L=0.5km B=8.0m		486		486		0	0		보상중 5%	군도 19호	국고 243
27	낭산~시명 선형개량사업	L=0.2km B=8.0m		1,000		1,000		0	0		공사중 50%	군도 9호	국고 500

□ 2022년도 신규사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비				공정	비고
			총 사업비	기투자	2022 예산	금후
계	3개소		3,700	0	330	3,370
망성 신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	2022~ 2024	1,000	0	100	900	설계중
삼기 만대선 (하나로~검지마을) 도로확포장	L=0.8km B=8.0m	2022~ 2024	1,200	0	80	1,120	설계중
금마농도303호종구선 도로확포장	L=0.6km B=8.0m	2022~ 2024	1,500	0	150	1,350	설계중

□ 2022년 준공된 사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2022 예산	금후
계	4개소		4,180	2,510	1,670	0
춘포 토다리~덕동간 도로확포장공사	L=1.0km B=8.0m	2018~ 2022	1,540	750	790	0	준공	2022.6.13.
금마 누동~신촌간 도로확포장공사	L=1.01km B=8.0m	2017~ 2022	980	580	400	0	준공	2022.8.25.
오산역~상아마을간 도로확포장공사	L=0.2km B=8.0m	2018~ 2022	250	200	50	0	준공	2022.4.21.
왕궁 양동마을 진입도로 확포장공사	L=0.6km B=8.0m	2018~ 2022	1,410	980	430	0	준공	2022.6.10.

□ 2022년도 예산 미확보사업(이월 및 계속사업)

해 당 사 항 없 음

2. 국도27호 서수~평장간 국도대체우회도로 용지보상

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	도로시설계장		진준용	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리(국도23호~국도1호)

▸1공구: 황등면 신기리, 황등리, 삼기면 용연리, 월성동, 임상동 일원

▸2공구: 삼기면 용연리, 금마면 갈산리, 용순리, 서고도리, 동고도리, 덕기동 일원

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업구모 : 도로확포장 L=14.19km, B=21.0m (4차로)

◦ 총사업비 : 185억원(시비)

▸1공구(월성동, 임상동) 85억원 / 2공구(덕기동) 100억원

(단위: 억원)

구분	총사업비	2022년	2023년	2024년 이후	비 고
계	185	10	62	113
1공구	85	-	-	85
2공구	100	10	62	28

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(동지역 토지보상 : 익산시)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계완료	: 2020. 11.

◦ 장기계속공사 총괄계약(1,2공구)	: 2021.  5.

◦ 2공구 도로구역결정 고시	: 2022.  2.

◦ 2공구 보상협의회 개최	: 2022.  8.

◦ 2공구 동지역 토지 보상협의	: 2022. 11. ~

▸보상율 64% (‘23년 4월 기준)

◦ 1공구 도로구역 결정 고시	: 2022. 12.

◦ 1공구 보상협의회 개최	: 2023.  3.

□ 문  제  점

◦ 1공구 : 동지역에대한 보상금(85억)예산 편성 필요

◦ 2공구 : 동지역(보상율 64%) 미협의 토지에 대하여 금년 내 수용재결 신청을 위한 예산(28억원) 편성 필요

□ 향 후 계 획

◦ 2공구 편입토지 보상협의 추진	: 2023.  5. ~

◦ 1공구 편입토지 보상협의 추진	: 2023.  9. ~

3. 생활여건 개선을 위한 주민숙원사업

확인자	:	건설과장		조 규 석	□
작성자	:	도로기반계장		이 인 성	□

□ 사업개요 및 추진실적

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사업대상

(단위: 백만원, 건, %)

사 업 명	사업량			사업비			비고
	대상	완료	추진중	전체	집행	잔액
합 계	226	187 (83%)	39	6,148	5,172 (84%)	976
소규모주민숙원사업	103	103 (100%)	0	1,182	1,181 (100%)	1
마을안길 노후도로 정비공사	97	69 (71%)	28	4,384	3,628 (83%)	756
지역밀착형참여사업 (마을안길)	26	15 (58%)	11	582	363 (62%)	219	도비

□ 문  제  점

◦ 사유지 토지사용 미승락에 따른 위치변경으로 공사 지연

□ 향 후 계 획

◦ 주민숙원사업 공사 완료	: 2023.  6.

4. 농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성사업

확인자	:	건설과장		조 규 석	□
작성자	:	도로기반계장		이 인 성	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 동산동 426번지 일원((구)농업진흥원))

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사 업 비 : 850백만원(특교세 300, 시비 300, 도비 250)

◦ 사업내용 : 보행 데크 설치(L=380m, B=2~4m) / 인도 정비(L=120m, B=2~4m)

□ 추 진 실 적

◦  실시설계용역 발주	: 2021.  1. ~ 11.

◦  행정절차 이행(산지전용, 농업생산기반시설 사용허가 등): 2021. 10. ~ 12.

◦  1차분 공사 시행	: 2021. 11. ~ 2022. 10.

◦  사유지 감정평가 의뢰 및 보상 추진	: 2022.  4. ~  9.

◦  2차분 공사발주	: 2022. 10.

□ 문  제  점

◦  2023년도분 예산확보(7월 추경, 10월 도비교부)가 늦어져 금년도 사업 완료가 어려움

□ 향 후 계 획

◦  2차분 공사 완료	: 2023. 7.

5. 숭모공원~석치마을간 도로확포장공사

확인자	:	건설과장		조 규 석	□
작성자	:	도로기반계장		이 인 성	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 석왕동 산96-4번지 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 1.

◦ 사 업 비 : 420백만원(시비 420)

◦ 사업내용 : 도로확포장(L=320m, B=8m)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역	: 2021.  1. ~    6.

◦ 행정절차 이행(산지전용, 도시계획시설인가 등)	: 2021.  7. ~   12.

◦ 사유지 감정평가 의뢰 및 보상 추진	: 2021. 11. ~ 2022. 4.

◦ 공사 발주	: 2022.  2.

◦ 공사 완료	: 2023.  1.

6. 지방하천 왕궁천 정비사업

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명		위 치	사업기간 (공사기간)	사 업 비	사업 내용
왕궁천 하천환경 정비사업		춘포면 익산천 합류점~ 왕궁면 동용리	2015.~2023.	47,368 (공사 34,824, 보상 5,000, 설계, 감리 등 7,544)	하천정비 L=9.25km (축제 및 보축, 교량9개소 재가설 등)
	1지구	익산천 합류점 (춘포면) ~흥암교	(2019.~2022.)	23,693 (공사 17,455, 보상 2,500, 설계 및 감리 등 3,738)	하천정비 L=4.62km (축제 및 보축, 교량5개소 재가설 등) ▸착공 : ‘19.3.11.
	2지구	흥암교 ~보석박물관 (왕궁면 동용리)	(2020.~2023.)	23,675 (공사 17,369, 보상 2,500, 설계 및 감리 등 3,806)	하천정비 L=4.63km (축제 및 보축, 교량4개소 재가설 등) ▸착공 : ‘20.3.3.

□ 추 진 실 적

◦ 1지구 공사 완료	: 2022.   8.

◦ 2지구 2차분 공사 완료	: 2022.  11.

◦ 2지구 3차분 공사 착공	: 2023.   3.

□ 문  제  점

◦ 흥암보 부근 농경지 원활한 배수 요청 민원처리 등으로 공사 다소 지연

□ 향 후 계 획

◦ 왕궁 2지구 3차분 공사 완료	: 2023.  11.

7. 지방하천 동면천 정비사업

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
동면천 하천환경 정비사업	왕궁면 동촌리~ 왕궁면 부상천 합류점	2017 ~ 2024	17,317 (공사 12,442, 보상 2,500, 설계, 감리 등 2,375)	하천정비 L=3.05km (축제 및 보축, 교량 7개소 재가설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 계약심의위원회 심의	: 2022.  3.

◦ 원가심사(전라북도) 완료	: 2022.  6.

◦ 동면천 하천정비공사(1차분) 착공	: 2022.  9.

□ 문  제  점

◦ 국가지정문화재(익산 왕궁리유적 및 제석사지) 주변 현상변경허가 심의로 사업 지연

□ 향 후 계 획

◦ 동면천 하천정비공사(1차분) 준공	: 2023.  6.

◦ 동면천 하천정비공사(2차분) 시행	: 2023.  7. ~ 12.

8. 진사소하천 정비사업

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
진사소하천 정비사업	여산면 원수리일원	2021. ~ 2023.	1,500 (공사 1,066, 보상 300, 설계 134)	하천정비 L=0.687㎞ (축제 및 보축, 교량3개소 재가설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 토질조사용역	(교량가설지역)	: 2021. 11.

◦ 실시설계용역	: 2021.  1. ~ 2022. 4.

▸주민설명회(2차)	: 2022.  2. 24.

▸공공디자인위원회 심의	: 2022.  4.  1.

▸설계심의위원회 심의	: 2022.  4. 28.

◦ 공사착공	: 2022.  6.

◦ 공사중지(편입토지 보상 등 절차 이행)	: 2022.  8. ~

□ 문  제  점

◦ 편입토지주 사망(5명)으로 인한 협의보상 지연

◦ 도지정 문화재(가람 이병기생가)현상변경 심의로 사업 지연

□ 향 후 계 획

◦ 토지수용 신청	: 2023.  4.

◦ 문화재 현상변경 심의 완료	: 2023.  4.

◦ 공사시행	: 2023.  4. ~ 12.

9. 황각소하천 정비사업

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천시설계장		김영진	□

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업기간	사 업 비	사업 내용
황각천 소하천 정비사업	금마면 신용리 일원	2022. ~ 2024.	2,000 (공사 1,500, 보상 350,설계 150)	하천정비 L=0.753km (축제 및 보축, 교량가설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 토질조사용역(교량가설지역)	: 2022.  2.

◦ 실시설계용역	: 2022.  2.

▸주민설명회(2회)	: 2022.  8. ~

▸공공디자인위원회 심의	: 2022. 12.

□ 문  제  점

◦ 국가지정 문화재(익산 미륵사지 관련)현상변경 심의로 사업 지연

□ 향 후 계 획

◦ 문화재 현상변경 심의 완료	: 2023. 5.

◦ 실시설계용역 준공	: 2023. 6.

◦ 편입토지 감정평가 및 보상협의	: 2023. 6. ~

◦ 공사 시행	: 2023. 6. ~ 2024. 12.

10. 만경강 친수시설 유지관리

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국가하천 만경강

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,680백만원(국비 1,228 시비 452)

※ 파크골프장 18홀 증설‘22년 특별교부세: 900백만원

◦ 사업내용 : 친수시설관리, 제방도로 및 자전거도로 제초, 시설물 보수, 목천지구 파크골프장(18홀) 증설 등

□ 추 진 실 적

◦ 만경강 환경정비사업 추진(1~8차)	: 2022.  3. ~ 12.

▸기간제인부(2명/일) 환경정비(쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등)

◦ 만경강 친수시설 유지관리	: 2022.  1. ~ 12.

▸휴게시설 설치(음수대 2, 흙먼지털이기 1)

▸제방 및 자전거도로, 산책로 풀깎기(A=166,100㎡, 2회)

▸자전거도로 볼라드·차선유도봉 설치(5개소), 전망데크 보수공사(4개소)

▸이미지 방지턱 설치(4개소), 태양광가로등(12개소), 이동식퍼걸러(5개소)설치

▸파크골프장 예초(A=9,600㎡, 3회) 및 모래부설(배토) 공사

◦ 만경강 목천지구 파크골프장 증설(18홀) 실시설계 용역 착수	: 2022.  7.

◦ 하천구역 출입 자동차단시설 설치 완료(만경교 언더패스)	: 2022. 12.

□ 문 제 점

◦ 만경강 화장실 3개소 노후화로 인한 기능보강 필요

□ 향 후 계 획

◦ 2023년 국가하천 만경강 유지관리 추진	: 2023. 3. ~ 12.

▸친수공간 제초 및 예초, 노후 시설물 보수 등

◦ 2023년 만경강 환경정비사업 추진	: 2023. 3. ~ 12.

◦ 만경강 파크골프장 내 이동식 화장실(2개소) 설치공사	: 2023. 4. ~  6.

◦ 만경강 파크골프장 증설 실시 설계 및 행정절차 진행	: 2022. 7. ~ 2023. 7.

▸하천점용허가(환경청), 소규모환경영향평가, 공공디자인심의 등

11. 만경강 문화관 운영 및 유지관리

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 220백만원(시비)

◦ 시설규모 : 연면적 1,658㎡(지상2층, 지하1층)

▸전시관, 체험관, 다목적실, 야외광장

◦ 주요내용 : 만경강 문화관 운영 및 시설물 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 시설물 안전관리대행용역 계약 및 유지관리	: 2022.  2.

▸전기, 소방 등 안전관리 계약 및 BF 인증 등의 시설물 유지관리

◦ 만경강 문화관 개관 및 운영	: 2022.  3. ~ 12.

▸만경강 주제 사진 전시회(30점)

▸ 반려 식물 소품 제작 등「자연 담은 체험 프로그램」( 56회, 867명)

◦ 조경 등 시설 유지관리	: 2022.  4. ~  9.

▸제초 및 풀깎기(6,000㎡, 3회), 관수시설(스프링클러) 설치

▸옥상정원 국화 식재(133㎡, 3,325본)

◦ 만경강 문화관 지주 간판 설치	: 2022. 10.

□ 문 제 점

◦ 현재 여러 프로그램을 운영하고 있으나 만경강만의 특색있는 프로그램 발굴 및 운영 필요

□ 향 후 계 획

◦ 만경강 문화관 내·외부 시설물 유지관리	: 2023. 1. ~ 12.

▸시설물 유지관리, 제초 및 예초, 초화류 식재 등

◦ 특색있는 만경강 문화관 전시 및 프로그램 운영        : 2023. 1. ~ 12.

▸친환경 제품 만들기, 줍깅(플로깅), 인문학 특강, 방학 프로그램 등

12. 금강 용안생태습지 유지관리

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국가하천 금강 용안생태습지(670,000㎡)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 985백만원(국비 440 시비 545)

◦ 사업내용 : 국가하천 금강 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 금강 용안생태습지 환경정비사업 추진(1~8차)	: 2022.  3. ~ 12.

▸환경미화, 예초·제초, 화장실 청소 등

◦ 친수시설 유지관리	: 2022.  3. ~  9.

▸산책로·배수로 정비(L=6.4km) 및 풀깎기(9.5km, 2회)

▸전망데크 연결도로 안전난간 설치(L=400m)

▸사계절 초화류 파종 및 식재(유채 외 8종 42,500㎡)

- 유채(14,000㎡), 꽃백일홍(3,700㎡), 해바라기(2,800㎡), 꽃잔디(1,800㎡), 코스모스(7,700㎡), 아스타국화(4,400㎡), 가우라(6,480㎡), 국화·맥문동(1,620㎡. 농업기술센터 협업)

◦ 데크광장(A=240㎡) 및 화장실(2개소) 보수	: 2022. 11.

□ 문 제 점

◦ 수목·초화류 생육에 적합한 양질토사의 반입이 필요하나, 환경부의 반대로 반입불가

□ 향 후 계 획

◦ 2023년 국가하천 금강 용안생태습지 유지관리 추진	: 2023. 3. ~ 12.

▸친수공간 제초 및 예초, 노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 2023년 금강 용안생태습지 환경정비사업 추진	: 2023. 3. ~ 12.

13. 하천제방 유지관리

확인자	:	건설과장		조규석	□
작성자	:	하천관리계장		이성철	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 관내 지방하천 27개소(187km) 및 소하천 62개소(102.2km)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 2,818백만원(도비 450 시비 2,368)

◦ 사업내용 : 관내 지방하천 및 소하천 준설, 제방보수, 제초, 하천환경정비 등

□ 추 진 실 적

◦ 익산천 외 13개소 준설공사(L=12.3km) 추진

◦ 덕기동 익산천, 기양천, 오산천, 호월천, 강경천, 죽청천 제방보수 공사 추진

◦ 석왕천 제방 제초 및 지방하천 10개소 풀깎기 공사 추진

◦ 하천유지보수 단가계약 1차 ~ 6차(준설, 응급복구, 제초작업 등) 추진

◦ 오산제 등 9개소 정기안전점검 용역, 원수우안1지구 외 6개소 정밀 안전점검 용역 추진

□ 문 제 점

◦ 하천 준설공사시 준설토 특성상 불순물 및 슬러지 성분으로 인해 사토장 선정 어려움

□ 향 후 계 획

◦ 2023년 하천제방 유지보수 사업 추진	: 2023. 1. ~ 12.

▸어량천, 필동천, 목천포천, 대조천, 익산천 등 하천준설공사

▸여산면 강경천 제방포장공사, 익산천 제방보수공사

▸하천 유지관리 단가계약(신문고, 시정에 바란다 등 민원처리사항