2023.  5.

제251회 익산시의회(제1차 정례회)

2023 행정사무감사자료

	상하수도사업단

상 수 도 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2022년도 업무성과 및 반성	9
				2.	2022년도 예산집행 및 추진사항(명시․사고이월등 포함)	11
				3.	2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	12
				4.	2022년도 감사시 지적사항 및 조치 결과(자체감사,상급기관)	16
				5.	5분 자유발언 조치 결과	18
				6.	시정질문에 대한 조치 결과	18
				7.	의원발의 조례 제·개정 후 추진현황	18
				8.	주요사업 조서(3천만원 이상)	19
				9.	2022년 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역	23
				10.	기금 운용 관련	23
				11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	24
				12.	용역사업 관련	26
				13.	인․허가 민원처리 관련사항	30
				14.	각종 공사 설계변경 상황	31
				15.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상)	32
				16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	33
				17.	국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)	34
				18.	지방보조금 성과평가 내역	34
				19.	2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역	35

			20.	2023년 명시 이월 내역	36
			21.	2023년도 명시이월(의회 제출) 후 2022년도에 집행한 내역	37
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황	37
			23.	공사 준공기한 연장 내역	38
			24.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	39
			25.	국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)	40
			26.	2022년도 계획사업중 미착공사업 현황	41
			27.	2022년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	41
			28.	2022년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업	42
			29.	2022년도 예산편성 후 전액 미집행 내역	42
			30.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황	43
			31.	소송 사건 현황	43
			32.	시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	44
			33.	시설·사무 민간위탁 현황	46
			34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황	47
			35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업현황	47
			36.	시 산하 재단 설립 현황	47
			37.	업무협약(MOU) 등 체결 현황	48

상 수 도 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	상수도 공기업 운영 사항	51
				2.	상수도 요금 부과징수 및 체납액 현황	52
				3.	유수율, 누수율 현황 및 노후관 현황	54
				4.	유수율 증대사업 추진	55
				5.	지방상수도현대화사업 (노후상수도정비, 스마트관망관리 구축)	56
				6.	상수도관망 기술진단용역	58
				7.	스마트미터 사업 추진	59
				8.	금마배수지 확충 공사	60
				9.	급수구역확장 및 급․배수관 개선공사	61
				10.	정수장에서 가정까지 안전한 수질관리	62
				11.	효율적인 수도계량기 관리	63
				12.	정수시설 운영관리	64
				13.	배수지 관리 현황(배수지 현황 등)	65
				14.	금강정수장 차염설비 설치공사	66

감사자료 과 공통사항

1. 2022년도 업무성과 및 반성

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□

□ 성    과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

▸노후상수도 정비사업 : 실시설계용역 추진(공정률 90%), 블록고립 및 운영(신흥급수구역 9개 블록)

▸스마트 지방상수도 지원사업 : 1차분(2,643백만원) 준공, 2차분(3,264백만원) 승인

◦ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

▸노후관 교체 / 변류 정비 및 교체 : 4개소 2.9㎞ / 202개소

▸긴급 누수처 복구 : 757개소

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸급수구역 확장공사 추진 : 여산면 신부마을 외 7개소 2.97km

▸급·배수관 민원공사 추진 : 475개소 9.0km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸급수장치 수선공사 2,094건

▸상수관 부설도로 노면정비 : 35개소 9.4㎞

▸수용가 옥내누수 탐사 927건

◦ 효율적 검침 및 부과징수로 경영효율화 제고

▸정확한 검침으로 부과체계 확립 : 수도계량기 조사원교육 11회, 현장검침 64,212전

▸상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 98.9%

▸노후 및 고장 계량기 등 신속 교체로 정확한 요금 부과 : 2,990전 교체

- 노후계량기 교체 : 2,339전(소구경 2,318전, 대구경 21전)

- 기타(동파, 고장 등) : 651전(소구경 637전, 대구경 14전)

□ 반    성

◦ 상수도요금 현실화 추진 보류

▸ 당초 인상계획 : 2023년 ~ 2027년 (5년간 매년 8.1% 인상)

▸ 사 유 : 타 공공요금인상 및 2023년 상반기 공공요금 동결 정부 기조

▸ 정부기조 및 고물가 안정 추이 등 고려하여 점진적으로 추진할 계획임

※ 연도별 현실화율 현황(2022년 69.61%, 2021년 72.89%, 2020년 71.41%)

2. 2022년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

(단위: 천원, %)

장	관	항	세항	예 산 현 액					지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2022 예산액	건설개량 이월액	사 고 이월액	예비비 사용액
상수도과				57,622,543	48,904,695	8,680,361	37,487	0	49,125,368	6,499,144		1,998,031	85.3	건설개량(1,590,886) 사 고(4,908,258)
	사업비용			26,243,209	26,236,927		6,282		24,718,247			1,524,962	94.2
		영업비용		26,193,209	26,186,927		6,282		24,718,247			1,474,962	94.4
			원수및취수비	13,232,243	13,232,243				12,981,738			250,505	98.1
			정수비	2,639,935	2,639,935				2,424,541			215,394	91.8
			배·급수비	787,576	787,576				751,328			36,248	95.4
			급·배수공사비	2,370,342	2,364,060		6,282		1,629,189			741,153	68.7	참고 1
			일반관리비	5,310,619	5,310,619				5,141,821			168,798	96.8
			징수 및 수용가 관리비	1,852,494	1,852,494				1,789,630			62,864	96.6
		예비비		50,000	50,000				0			50,000	0
	자본적지출			31,379,334	22,667,768	8,680,361	31,205	0	24,407,121	6,499,144		473,069	77.8	건설개량(1,590,886) 사 고(4,908,258)
		유형자산취득		16,177,684	6,846,118	8,680,361	31,205	620,000	9,355,666	6,499,144		322,874	57.8	건설개량(1,590,886) 사 고(4,908,258)
			구축물	7,919,062	6,571,374	696,483	31,205	620,000	5,862,772	1,784,649		271,641	74	건설개량(1,590,886) 사 고 (193,763)
			기계장치	8,239,516	255,638	7,983,878			3,473,959	4,714,495		51,062	42.2	참고 2 사 고(4,714,495)
			공기구비품	19,106	19,106				18,935			171	99.1
		비가동설비자산취득		15,041,377	15,041,377				15,041,377			0	100
			건설중인자산	15,041,377	15,041,377				15,041,377			0	100
		기타자본적지출		10,169	10,169				10,078			91	99.1
			정부보조금 반환	10,169	10,169				10,078			91	99.1
		예비비		150,104	770,104			△620,000	0			150,104	0

(참고) 2022년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	예산액	지출액	비율	부 진 사 유
1	급·배수공사비	2,370,342	1,629,189	68.7%	□22년 상반기 지출액 대비 하반기(2회추경) 예상 지출액을 편성하였으나 급수신청 부진
2	기계장치	8,239,516	3,473,959	42.2%	□스마트미터사업(원격검침단말기 구입․설치) 준공 시기 미도래로 인한 예산 이월

3. 2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
계	11건
1	• 상수도 요금 현실화 관련 ▸코로나로 인하여 상수도 요금의 현실화가 계속 늦어지고 있으나 시민들에게 맑은물 공급과 상수도 재정악화 해결을 위해 상수도 요금 현실화가 이루어질 수 있도록 장기적인 대안을 마련하기 바람 ▸상수도 요금인상이 어렵다면 생산원가를 절감하는 방안을 모색하기 바람	▸타 공공요금 인상 및 2023년 상반기 공공요금 동결 정부기조에 따라 2023년 하반기 이후 상수도요금 현실화 추진 준비하겠으며, 요금체계 개편시 장기적으로 재정건전성이 유지될 수 있도록 검토하겠음 ▸상수도 요금 인상은 불가피하며, 물가인상률등을 고려하여 점진적으로 추진하겠음
22	• 신흥보조수원지 및 대간선수로 관리 관련 ▸우리 시민들의 식수원인 신흥보조수원지와 대간선수로의 오염방지를 위해서는 순찰 및 관리 지침을 수립하여 오염방지 활동에 철저를 기하기 바람	▸상수원보호구역 및 상수원 수로에 대하여 정기적인 순찰을 실시하고 있으며, 수시 수질검사 실시로 오염원 관리에 만전를 기하고 있음
	▸대간선수로 시작부인 만경강 어우보에 쓰레기 등 부유물질이 많이 있는바, 농어촌공사에서 제거할 수 있도록 조치하시기 바람	▸한국농어촌공사(2022.10.18. )에 상수원수로 오염물질 수거요청 공문발송 및 맑은물 공급에 상호 유기적인 협조 요청
3	• 금마배수지 확충공사 관련 ▸금마배수지 확충 용량은 앞으로 건설될 공동주택까지 고려하여 급수 부족 문제가 발생되지 않도록 바람	▸금마배수지 확충공사는 익산시 수도정비기본계획에 반영하여 추진중이며, 급수부족 문제가 발생하지 않도록 조기 완공에 노력하겠음
4	• 스마트 미터 사업 관련 ▸스마트미터 사업을 위해 디지털계량기를 설치한지 1년이나 지났음에도 불구하고 원격검침이 이루어지고 않고 있어 예산이 낭비되고 있는 실정임 ▸원격검침 단말기 구입설치 추진시 환경부 시방서와 다르게 추진하면서 특혜 의혹이 제기되어 입찰공고가 취소된 후 1년 동안 아무런 조치를 취하지 않았음 ▸원격검침단말기 공급업체 선정 시 공정하게 특혜 의혹이 제기되지 않도록 노력하기 바람	▸검침단말기 구입설치 업체 선정시 공정한 방법에 의거 업체 선정하였으며 2023. 3. 원격검침 단말기 설치 완료하였음
5	• 상수원 보호구역 관련 ▸국화축제 개최장소 중 신흥보조수원지 주변이 포함되어 있는데, 상수원 보호를 위해 펜스를 설치했다 하더라도 오염원 유입이 가능하며 상수원보호구역 내에서 축제를 하는 것은 관련 법규에 위배되는 행위임	▸상수원 오염방지를 위하여 정기적인 순찰 및 수질검사 및 쓰레기 수거 청소를 실시하고 있으며, 상수원보호구역에서 오염행위가 발생하지 않도록 관리하겠음
6	• 행정사무감사 보고시 보고서 작성 관련 ▸의회에서 요구한 보고서 작성양식에 맞게 보고서가 작성될 수 있도록 시정하기 바람	▸의회에서 요구한 보고서 양식에 맞게 보고서를 작성하였음
7	• 각종 공사 설계변경 관련 ▸공사 추진시 설계변경이 많이 발생 되고 있는바 최초 발주부터 과정을 철저히 검토하여 설계변경이 발생되지 않도록 노력하기 바람	▸상수도 공사시 설계시부터 철저히 검토하여 설계변경이 발생하지 않도록 하겠음
8	• 상수도 요금 체납액 관련 ▸상수도 요금 체납액이 점점 증가하고 있어 체납자에 대한 적극적인 납부 독려를 통해 체납액이 감소 될 수 있도록 노력하기 바람 ▸가정용 상수도의 경우 시민의 생명권과 직결되는 만큼 단수조치는 고려하기 바람	▸체납액 감소 위해 적극적으로 납부 독려하고 압류 등 징수활동을 철저히 하겠음 ▸가정용의 경우 독려 위주의 징수 활동을 하겠음
9	• 긴급 상수도 공사 추진 관련 ▸긴급 상수도공사로 인한 단수로 시민들이 매우 불편해하고 있으므로 사전 안내나 홍보를 통해 시민들의 불편이 최소화 될 수 있도록 조치하기 바람	‣시민 불편 사항을 최소화하기 위해 사전 문자발송 및 현장에서 방송 장비를 이용한 수용가 안내 등 홍보를 추진하고 있음
10	• 상수도사업소 회계 관련 ▸상하수도사업소 여유자금 관리 내역을 자료로 제출하기 바람	▸자료 기제출하였음
11	• 집행잔액 관련 ▸예산 집행 실적이 저조하여 집행잔액이 과도하게 발생 되고 있어 예산의 효율성을 위하여 적정하게 예산이 편성될 수 있도록 노력하기 바람	▸불용예산이 발생되지 않게 예산 편성시 철저히 검토하겠음

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□
		수질실험계장		문대은	□

4. 2022년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□

연번	지 적 사 항	조치(처리)결과	비고
1	• 세입세출외 현금 관리 부적정 ▸소멸시효 경과 장기보관예치금 세입세출외현금 세입처리	▸세입조치 완료 - 세입금액 : 726,660원 (2022.2.10.)	종합감사
2	• 법인카드 사용 관리 소홀 ▸보관책임자 변경시 카드 비밀번호 변경 및 포인트 세입처리	▸법인카드 비밀번호 변경 및 세입조치 완료 - 포인트 세입금액 : 311,138원(2022.2.10.)
3	• 복무관리 소홀 ▸법적 의무 건강검진이 아닌 35세이상 건강검진시에 공가 사용	▸관계공무원에게 지도․교육을 통하여 규정을 숙지시키고, 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠음
4	• 기간제 근로자 채용절차에 관한 사항 ▸기간제 근로자 채용시 채용계획을 수립하지 않았고, 채용서류 접수에 방문 및 등기우편접수로 한정하여 구직자의 불편을 초래	▸기간근로자 채용시 계획수립등 채용절차를 준수하도록 관계공무원에게 지도․교육을 통하여 관련 규정을 숙지시켰으며, 유사 사례가 발생되지 않도록 하겠음
5	• 상수도요금 체납관리 소홀 ▸상수도요금 체납자의 재산조회 등을 통한 재산압류 등 체납관리 업무 철저	▸체납자 재산 압류등기 완료하였음	종합감사
6	• 모범음식점 상수도 요금감면 관리 소홀 ▸미지정 모범업소의 과다 감면금액 회수조치 및 관련 규정 숙지	▸5개업소 과다 감면금액에 대하여 회수 조치 완료 하였으며 1개 업소 납부 독려하여 납부 예정
7	• 시설공사 하자 검사 업무 소홀 ‣조속한 시일 내에 시설공사에 따른 하자검사를 완료하고, 관계공무원에게 지도 교육	‣미완료 공사에 대한 검사실시 및 관계 공무원에게 지도 교육 하였음
8	• 산업안전보건관리비 정산 부적정 ‣안전관리 사용이 불가능한 항목으로 집행한 부적정 금액을 회수하기 바람	‣회수 완료 - 회수금액 : 1,358,000원(2022.4.28.)
9	• 시설공사 계약심사 미이행	▸관계공무원에게 지도․교육을 통하여 규정을 숙지시키고, 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠음
10	• 도로점용(굴착)허가 관련 행정절차 이행 소홀	▸관계공무원에게 지도․교육을 통하여 규정을 숙지시키고, 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠음
11	• 준공검사(미시공 공사 설계변경 등) 업무 소홀	▸회수완료 - 회수금액 : 323,990원
12	•2022년 익산소방서 종합감사 ‣익산소방서에서 2020~2021년까지 사용 불편 지하식 소화전에 대한 이설(신설)요청을 하였으나 미조치	‣대상 지하식 소화전에 대하여 전수조사 실시 후 사업추진 완료	익산 소방서 종합감사 (전라북도)

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

8. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□

					(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
	계	19 건	9,198,835	2,501,526	6,682,309	27.1
1	금강정수장 차염설비설치공사	·사업기간 : 2022. 7. 11. ~ 2023. 1. 2. ·사 업 비 : 532,000천원 ·사업내용 : 차염설비 1식, 건축동 1동 설치	538,000	117,868	420,132	21.9	건설개량
2	신흥정수장공업용수 변압기설치공사	·사업기간 : 2022. 5 9. ~ 2022. 5. 16. ·사 업 비 : 48,760천원 ·사업내용 : 변압기(750KVA 1대 설치, 바닥 콘크리트 타설 3.6㎡	55,000	47,067	7,933	85.5
3	신흥·금강정수장 침전지슬러지수집기 보수공사	·사업기간 : 2022. 6. 16. ~ 2022. 9. 7. ·사 업 비 : 28,226천원 ·사업내용 :슬러지 배출펌프 4대(2.2KW) 및 배관(80m) 설치	30,000	25,402	4,598	84.6
4	신흥정수장 여과지 정수밸브 교체공사	·사업기간 : 2022. 10. 25. ~ 2022. 11. 7. ·사 업 비 : 46,892천원 ·사업내용 : 정수밸브 6대 교체	48,000	45,463	2,537	94.7
5	신흥·금강정수장 여과지 표면세척 설비 보수공사	·사업기간 : 2022. 11. 24. ~ 2022. 12. 16. ·사 업 비 : 32,828천원 ·사업내용 : 표세노즐 576개 교체	42,000	29,544	12,456	70.3
6	상수도 정·배수지 청소용역 (상반기)	·사업기간 : 2022. 4. 28. ~ 2022 .6. 24. ·사 업 비 : 49,933천원 ·사업내용 : 배수지 청소(총6개소-17지)	98,484	41,423	15,969	83.7
	상수도 정·배수지 청소용역 (하반기)	·사업기간 : 2022. 10. 27. ~ 2022. 11. 29. ·사 업 비 : 49,581천원 ·사업내용 : 배수지 청소(총6개소-17지)		41,092
7	정수시설물 정밀점검용역 (신흥·금강정수장)	·사업기간 : 2022. 3. 14 ~ 2022. 8. 10. ·사 업 비 : 43,120천원 ·용업업체 : ㈜대영토건 ·사업내용 : 신흥·금강정수장 정밀점검용역	72,000	38,282	8,948	87.5
	정수시설물 정밀점검용역 (신흥보조수원지 및 왕궁배수지)	·사업기간 : 2022. 3. 11. ~ 2022. 8. 5. ·사 업 비 : 28,270천원 ·용업업체 : ㈜고엘 ·사업내용 : 신흥보조수원지 및 왕궁 배수지 정밀점검용역		24,770
8	신흥수원지 둘레길 안전시설설치공사	·사업기간 : 2022. 8. 30 ~ 2022. 12. 16. ·사 업 비 : 408,085천원 ·사업내용 - 메쉬휀스 1,130m 및 기초콘크리트 1,370m 설치 - 디자인 울타리 840m 설치 - CCTV 9대 설치 - 전동 출입문 2개소 설치 - 스피커 6대, 피플 카운터 카메라 1대 설치	620,000	382,706	237,294	61.7
9	여산면 신부마을 배수관부설공사(2차)	·사업기간 : 2022. 3. 23.~ 2022. 5. 20. ·사 업 비 : 97,725천원 ·사 업 량 : L=479m ·사업내용 : 배수관 부설(D75mm)	97,725	92,870	4,855	95
10	목천정미소~신교마을 배수관부설공사	·사업기간 : 2022. 4. 26. ~ 2022. 6. 24. ·사 업 비 : 90,236천원 ·사 업 량 : L=301m ·사업내용 : 배수관 부설(D150mm)	90,236	81,984	8,252	90.8
11	함라면 신대마을 배수관부설공사	·사업기간 : 2022. 5. 12. ~ 2022. 7. 7. ·사 업 비 : 146,314천원 ·사 업 량 : L=841m ·사업내용 : 배수관 부설(D100mm)	146,314	137,222	9,092	93.7
12	성당면 두동리 847번지 배수관부설공사	·사업기간 : 2022. 5. 10. ~ 2022. 7. 6. ·사 업 비 : 99,744천원 ·사 업 량 : L=960m ·사업내용 : 배수관 부설(D75mm)	99,744	88,233	11,511	88.4
13	원격검침 단말기 구입설치 (1차분)	·사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 1. ·사 업 비 : 1,927,500천원 ·사 업 량 : 원격검침단말기 12,850개 ·사업내용 : 원격검침단말기 구입설치	1,927,500	-	1,927,500	0	사고이월
14	원격검침 단말기 구입설치 (2차분)	·사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 2. ·사 업 비 : 1,927,500천원 ·사 업 량 : 원격검침단말기 12,850개 ·사업내용 : 원격검침단말기 구입설치	1,927,500	-	1,927,500	0	사고이월
15	원격검침 단말기 구입설치 (3차분)	·사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 2. ·사 업 비 : 1,935,000천원 ·사 업 량 : 원격검침단말기 12,900개 ·사업내용 : 원격검침단말기 구입설치	1,935,000	-	1,935,000	0	사고이월
16	노후교체 및 민원대비 수도미터기 구입	·사업기간 : 2022. 1.~ 2022. 12. ·사 업 비 : 220,037천원 ·사 업 량 : 디지털 수도미터기 등 2,910개 ·사업내용 : 노후교체 및 민원대비 수도미터기 구입	220,037	169,687	35,350	77.1
17	대구경 수도미터기 구입	·사업기간 : 2022. 1.~ 2022. 12. ·사 업 비 : 376,545천원 ·사 업 량 : 대구경 전자식 수도미터기 59개 ·사업내용 : 법적사용기간(6년) 경과 대구경 수도미터기 구입	376,545	324,161	52,384	86.1
18	동파 및 긴급민원처리 대비 수도미터기 구입	·사업기간 : 2022. 1.~ 2022. 12. ·사 업 비 : 174,750천원 ·사 업 량 : 소구경 디지털 수도미터기 2,500개 ·사업내용 : 동파대비 및 긴급민원처리 수도미터기 구입	174,750	148,786	25,964	85.1
19	상수도관망 최적화사업(노후관교체 공사 등) ·사업기간 : 2022 1. ~ 12. ·총사업비 : 700,000천원 ·사 업 량 : L=2.9km ·사업내용 노후관 교체 공사 4개소 등	·사업기간 : 2022. 3 .2. ~ 2022. 5. 4. ·사 업 비 : 157,160천원 ·사 업 량 : L=840m ·사업내용 : 오산면 오산리 1072-6(서오산마을) 일원 노후관교체	157,160	144,056	13,104	92
		·사업기간 : 2022. 3. 2. ~ 2022. 5. 17. ·사 업 비 : 151,582천원 ·사 업 량 : L=862m ·사업내용 : 오산면 평동로 45(모산교회) 일원 노후관교체	151,582	142,330	9,252	94
		·사업기간 : 2022. 3. 2. ~ 2022. 5. 13. ·사 업 비 : 132,590천원 ·사 업 량 : L=880m ·사업내용 : 오산면 오산리 1069-23(농흥마을) 일원 노후관교체	132,590	122,291	10,299	92
		·사업기간 : 2022. 3. 2. ~ 2022. 5. 17. ·사 업 비 : 73,668천원 ·사 업 량 : L=291m ·사업내용 : 용안면 창리 719(송정마을) 일원 노후관교체	73,668	71,756	1,912	97
		·사업기간 : 2022. 3. 29. ~ 2022. 6. 15. ·사 업 비 : 185,000천원 ·사 업 량 : L=2,802m ·사업내용 : 오산면 일원 노후관 교체도로 노면정비공사	185,000	184,533	467	99

9. 2022년 각종 민원(진정, 건의, 청원 등)

접수 처리내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	누수방지계장		유수길	□

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비고
	일 자	성 명	내 용
1	2022. 12.08.	송**	▪상수도 공사로 인하여 교통 사고 유발	▪공사 현장에 대한 안내 및 시공사 피해보상 완료

10. 기금 운용 관련

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	상수도과장		송 방 섭	□
작성자	:	수질실험계장		문 대 은	□

□ 위원회 설치 현황

위 원 회 명	설 치 근 거	위원장	위원수	기능
수돗물평가위원회	수도법 제30조의1 익산시 상수도급수조례 제48조	부시장	10	자문

□ 위원회 운영 현황

위원회명 (운영횟수)	구분	회의일자	회의록		수 당 지급액 (천원)	비고
			공개일자	공개방법
수돗물평가위 원 회 (2회)	대면	‘22. 5.20	‘22. 5.26	익산시 홈페이지	280	원․정수 수질관리 및 홍보등
	대면	‘22.12.20	‘22.12.22	익산시 홈페이지	350

□ 각종 위원회에서 심의하여 단체장의 의견이 수정된 사례

해    당    없    음

□ 단체장이나 부단체장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회 현황

위 원 회 명	위원장	비고
수돗물평가위원회	부시장

□ 위원회 위원 명단

□ 수돗물평가 위원회 (임기 2년 / 2021. 7. ~ 2023. 6.)

연번	소 속	성 명	직 위	연번	소 속	성 명	직 위
1	부시장	전대식	위 원 장	6	익 산 시 새마을부녀회 회 장	강이순	위 원
2	상하수도사업단 장	양경진	부위원장	7	대한미용사회 익산지부 회장	최춘자	위 원
3	익산시의회 의 원	강경숙	위 원	8	익 산 시 여성단체협의회 회 장	박정순	위 원
4	전북대학교 생명공학부 교 수	조 민	위 원	9	원광대학교 건설환경공학과 교 수	최혁순	위 원
5	익산 YWCA 회 장	고혜정	위 원	10	한국수자원공사 전주권 지사 차 장	임성호	위 원

12. 용역사업 관련

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□

□ 용역사업 추진 현황

(단위 : 천원)

구분	용 역 명	예산액	계약금액	집행액	용역업체	계약방법	비고
계	45 건	1,483,799	874,985	764,854
일반 용역	상수도 정·배수지 청소용역 (상반기)	98,484	44,310	41,323	(유)엠파워	2인이상 견적수의
	상수도 정·배수지 청소용역 (하반기)		43,919	41,092	(유)대산환경	2인이상 견적수의
일반 용역	2022년 신흥 및 금강정수장 침전지 청소용역(1차)	40,204	7,970	7,300	(유)현대그린환경	1인수의
	2022년 신흥 및 금강정수장 침전지 청소용역(2차)		7,970	7,240	수청환경	1인수의
	2022년 신흥 및 금강정수장 침전지 청소용역(3차)		7,970	7,520	미화산업사	1인수의
	2022년 신흥 및 금강정수장 침전지 청소용역(4차)		8,228	8,228	(유)서동환경	1인수의
	정수장 여과지 및 역세척 수조 청소용역		4,180	4,180	(유)서동환경	1인수의
기술 용역	정수시설물 정밀점검용역 (신흥·금강정수장)	72,000	38,282	38,282	㈜대영토건	2인이상 견적수의
	정수시설물 정밀점검용역 (신흥보조수원지및왕궁배수지)		24,770	24,770	㈜고엘	2인이상 견적수의
기술 용역	금강정수장 차염설비 설치공사(차염주입설비) 실시설계용역	538,000	19,620	19,620	수엔지니어링	1인수의
	금강정수장 차염설비 설치공사(건축) 실시설계용역		13,050	13,050	민건축사사무소	1인수의
기술 용역	2022년 무인경비 용역 (왕궁배수지, 금마가압장, 팔봉배수지)	6,744	5,872	5,872	㈜에스케이쉴더스	1인수의
기술 용역	금강정수장 건축물대장 생성 및 정정신청 용역	5,400	5,130	5,130	민건축사 사무소	1인수의
기술 용역	신흥정수장 염소설비 배관 두께측정 용역	2,500	2,450	2,450	㈜모듬이엔지	1인수의
기술 용역	유량계 교정검사	16,800	13,798	13,798	㈜자인테크놀로지	1인수의
일반 용역	2022년 정수시설물 부지 풀 깎기 용역(1차)	60,000	17,998	17,998	(유)대산환경	1인수의
	2022년 정수시설물 부지 풀 깎기 용역(2차)		4,493	4,493	(유)대산환경	1인수의
	2022년 정수시설물 부지 풀 깎기 용역(3차)		19,774	19,774	(유)청우조경	1인수의
	2022년 정수시설물 부지 풀 깎기 용역(4차)		17,332	17,332	(유)청우조경	1인수의
일반 용역	2022년 급수공사 GIS DB 구축용역	29,439	26,269	24,329	㈜산야	2인이상 견적수의
일반 용역	여산면 신부마을 배수관부설공사(2차) 건설폐기물처리용역	9,933	9,138	9,138	㈜에코건설산업	1인수의
기술 용역	함라면 신대마을외 2개소 배수관부설공사 실시설계용역	19,672	17,704	17,704	㈜주한건설기술단	1인수의
일반 용역	성당면 두동리 847번지 배수관부설공사 건설폐기물처리용역	12,496	11,246	12,632	㈜류한환경	1인수의
일반 용역	목천정미소~신교마을 배수관부설공사 건설폐기물처리용역	12,870	11,583	11,583	㈜에코건설산업	1인수의
일반 용역	함라면 신대마을 배수관부설공사 건설폐기물 처리용역	19,932	17,938	17,938	(유)다일환경산업	1인수의
일반 용역	익산시 춘포면 갈전마을외 7개소 배수관부설공사 실시설계용역	41,445	36,714	25,700	(유)장흥 건설기술공사	2인이상 견적수의	건설개량 (11,014)
일반 용역	금마배수지 확충공사에 따른 폐기물 처리 용역	59,554	52,205	-	㈜류한환경	2인이상 견적수의	사고이월
일반 용역	상하수도 요금 가상계좌 시스템 유지보수 계약	8,400	7,728	7,728	(주)노드코어	1인수의
일반 용역	상하수도, 물이용, 음식물 S/W 유지보수 계약	21,600	19,872	19,872	㈜유니버스 시스템	1인수의
일반 용역	상하수도 요금 시스템 하드웨어 유지보수 계약	4,800	4,560	4,560	(주)도담솔루션	1인수의
일반 용역	2022년도 상수도 계량기 옥외 검침시스템 유지보수 계약	3,000	2,965	2,965	신한정밀(주)	1인수의
일반 용역	2022년도 상수도 계량기 옥외 검침시스템 유지보수계약	3,500	3,355	3,355	㈜가암테크	1인수의
일반 용역	2022년도 상수도 계량기 옥외 검침시스템 유지보수계약	5,364	4,586	4,586	영아이티(주)	1인수의
일반 용역	2022년도 상수도 계량기 옥외 검침시스템 유지보수계약	3,000	2,277	2,277	㈜월콤시스	1인수의
일반 용역	고속프린터(SP-1360R) 유지보수 계약	5,000	3,237	3,237	디에스정보	1인수의
일반 용역	전산실 항온항습기 유지관리계약	1,560	1,528	1,528	범양테크	1인수의
기술 용역	전자식 수도미터기 재검정 용역	36,800	14,850	14,850	청수계기	1인수의
기술 용역	익산시 상수도관망 전문기술진단용역	200,000	192,994	154,300	주식회사정엔지니어링	1인수의
기술 용역	오산면 오산리 1072-26일원(서오산마을 일원) 외 4개소 노후관 교체공사 실시설계용역	21,909	19,718	19,718	(주)우향이앤씨	1인수의
일반 용역	오산면 오산리 1072-6(서오산마을 일원) 노후관교체공사 폐기물처리용역	11,000	10,983	10,983	(유)진영환경	1인수의
일반 용역	용안면 창리 719(송정마을 일원) 노후관교체공사 폐기물처리용역	10,000	9,876	9,876	(주)류한환경	1인수의
일반 용역	오산면 오산리 1069-23(농흥마을)일원 노후관교체공사 폐기물처리용역	10,318	9,286	9,286	(주)에코건설산업	1인수의
일반 용역	오산면 평동로 45(모산교회) 일원 노후관교체공사 폐기물처리용역	10,120	8,866	8,866	(유)다일환경산업	1인수의
일반 용역	오산면 일원 노후관 교체도로 노면정비공사 폐기물처리용역	32,802	28,888	28,888	(주)일진도시환경	2인이상 견적수의
기술 용역	2022년 상수도 노후관교체공사 GIS DB 구축용역	49,153	39,503	39,503	유한회사 산야	2인이상 견적수의

□ 용역비 미집행 사업 추진 현황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	사업비	집행액	추진현황	비고
일반 용역	금마배수지 확충공사에 따른 폐기물 처리 용역	59,554	-	준공시기 미도래 ▸1차분 확충공사□23년 8월 준공 예정

□ 용역사업 중 사전 기술심사를 하여 참가자격 제한 사례

해    당    없    음

□ 각종 용역사업 중 실제사업에 적용시키지 못하고 사장하고 있는 용역현황

해    당    없    음

□ 각종 용역 사업 중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례

해    당    없    음

13. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□
		수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	급수시설계장		도일	□
		누수방지계장		유수길	□

(단위 : 천원)

일자	사 업 명	사업개요	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증감
계	8 건		485,224	457,473	△27,751
202205.16.	여산면 신부마을 배수관 부설공사(2차)	· 사 업 량 : L=479m · 사업내용 ▸배수관 부설(D75mm)	57,433	56,048	△1,385	(유)우승건설	22. 3. 23.~ 22. 5. 20.	주민 요청에 따른 관로 부설 연장 및 불필요한 지장물 이설비 삭감
2022 06.21.	목천정미소~신교마을 배수관 부설공사	· 사 업 량 : L=301m · 사업내용 ▸배수관 부설(D150mm)	47,907	41,150	△6,757	(유)광우건설	22. 4. 26.~ 22. 6. 24.	불필요한 지장물 이설비 삭감
2022 07.06.	함라면 신대마을 배수관 부설공사	· 사 업 량 : L=841m · 사업내용 ▸배수관 부설(D100mm)	72,168	70,821	△1,347	(유)아태건설	22. 5. 12.~ 22. 7. 7.	불필요한 지장물 이설비 삭감
2022 07.05.	성당면 두동리 847번지 배수관부설공사	· 사 업 량 : L=960m · 사업내용 ▸배수관 부설(L=75m)	61,649	56,972	△4,677	㈜브살렐건설	22. 5. 10.~ 22. 7. 6.	불필요한 지장물 이설비 삭감
2022 05.03.	오산면 오산리 1072-6 (서오산마을) 일원 노후관교체공사	· 사 업 량 ▸D150mm L=840m · 사업내용: 노후관 교체	77,417	71,217	△6,200	(유)한성건설	22. 3. 2. ~ 22. 5. 4.	토공 수량 변경 및 현장 내 지장물 이설 불필요
2022 05.11.	오산면 평동로 45(모산교회) 일원 노후관 교체공사	· 사 업 량 ▸D150mm L=862m · 사업내용 : 노후관 교체	71,408	70,639	△769	㈜한백건설	22. 3. 2. ~ 22. 5. 17.	자재 수량 변경 및 횡단관 설치 추가 반영
2022 05.09.	오산면 오산리 1069-23(농흥마을) 일원 노후관교체공사	· 사 업 량 ▸D150mm L=880m · 사업내용 : 노후관 교체	64,316	58,410	△5,906	㈜브살렐건설	22. 3. 2. ~ 22. 5. 13.	토공 수량 변경 등
2022 05.10.	용안면 창리 719(송정마을) 일원 노후관 교체공사	· 사 업 량 ▸D150mm L=291m · 사업내용 : 노후관 교체	32,926	32,216	△710	(유)우승건설	22. 3. 2. ~ 22. 5. 17.	토공 수량 변경 및 현장 내 지장물 이설 불필요

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		누수방지계장		유수길	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	집행액	시공회사
계	10 건		1,214,061	1,137,275
금강정수장 차염설비 설치공사(건축)	금강정수장 차염설비 건축동 1동	22. 10. 4.~12. 20.	80,042	72,000	(유)남양건설
여산면 신부마을 배수관부설공사(2차)	·사 업 량 : L=479m ·사업내용 ▸배수관 부설(D75mm)	22 3. 23.~5. 20.	97,725	92,870	(유)우승건설
목천정미소~신교마을 배수관부설공사	·사 업 량 : L=301m ·사업내용 ▸배수관 부설(D150mm)	22. 4. 26.~6. 24.	90,236	81,984	(유)광우건설
함라면 신대마을 배수관부설공사	·사 업 량 : L=841m ·사업내용 ▸배수관 부설(D100mm)	22. 5. 12.~7. 7.	146,314	137,222	(유)아태건설
성당면 두동리 847번지 배수관부설공사	·사 업 량 : L=960m ·사업내용 ▸배수관 부설(D75mm)	22. 5. 10.~ 7. 6.	99,744	88,233	㈜브살렐건설
상수도관망 최적화사업(노후관교체 공사 등) ·사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ·총사업비 : 700,000천원 ·사 업 량 : L=2.9km ·사업내용 : 노후관 교체 공사 4개소 등	·사 업 량 : L=840m ·사업내용 ▸오산면 오산리 1072-6 (서오산마을) 일원 노후관교체	22. 3. 2. ~ 5. 4.	157,160	144,056	(유)한성건설
	·사 업 량 : L=862m ·사업내용 ▸오산면 평동로 45(모산교회) 일원 노후관교체	22. 3. 2. ~ 5. 17.	151,582	142,330	㈜한백건설
	·사 업 량 : L=880m ·사업내용 ▸오산면오산리 1069-23 (농흥마을) 일원 노후관교체	22. 3. 2. ~ 5. 13.	132,590	122,291	㈜브살렐건설
	·사 업 량 : L=291m ·사업내용 ▸용안면 창리 71(송정마을) 일원 노후관교체	22. 3. 2. ~ 5. 17.	73,668	71,756	(유)우승건설
	·사 업 량 : L=2,802m ·사업내용 ▸오산면 일원 노후관 교체도로 노면정비공사	22. 3. 29. ~ 6. 15.	185,000	184,533	㈜고 엘

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□
		수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

17. 국·도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	예 산 액				집 행 액				비고
		계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
	계	24,111	13,151	2,272	8,688	18,310	9,851	1,512	6,947
1	금마배수지 확충공사	1,086	-	760	326	-	-	-	-	건설개량 이월
2	지방상수도스마트 관망관리 (스마트미터)	7,984	5,589	-	2,395	3,269	2,289	-	980	사고이월
3	노후상수도 정비사업	15,041	7,562	1,512	5,967	15,041	7,562	1,512	5,967

18. 지방보조금 성과평가 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

19 2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□

□ 이월사업 개요	5건 / 8,718백만원

▸명 시 이 월         :  2건 / 8,680백만원

▸사 고 이 월         :  3건 /   38백만원

□ 명시이월사업

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
계	2건	8,680	3,771	4,909	43.4
금마배수지 확충공사	배수지증설 (V=5,000㎥→V=15,000㎥)	696	502	194	72.1
지방상수도스마트 관망관리 (스마트미터)	원격검침기 설치 38,600전	7,984	3,269	4,715	40.9

□ 사고 이월사업

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
계	3건	38	38	0	100
남중동 세계기독교 통일신령연합회 대구경 신설	급수관 부설 L=8.0, D=50mm	6	6	0	100
금마배수지 확충공사	금마배수지 확충 (V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)	18	18	0	100
여산면 신부마을 외 1개소 배수관 부설 및 가압장 설치 실시설계용역	배수관 부설공사 설계 1식 가압장 설치공사 설계 1식	14	14	0	100

20. 2023년 명시이월 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		누수방지계장		유수길	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	지출액	이월액	이월사유	비고
4개 사업	2,494	903	1,591
금마배수지확충공사	1,086	0	1,086	준공시기 미도래
급수구역내 급배수관 확장공사	670	631	39	준공시기 미도래
금강정수장 차염주입설비 설치공사	538	118	420	준공시기 미도래
상수도관망 기술진단용역	200	154	46	준공시기 미도래 (환경부 승인 지연)

21. 2023년 명시이월(의회제출) 후 2022년도에 집행한 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

22. 예산 전용, 이용 및 예비비 건별 집행 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		요금계장		김순동	□
		수질실험계		문대은	□

◈ 예 비 비

(단위 : 천원)

연번	사업명	결정액	집행액	사 유	비 고
1	신흥정수장 둘레길 안전시설 설치공사	620,000	382,706	•둘레길 내 안전시설 설치로 정수시설 보호 및 내방객 안전 확보

◈ 예산 이용 및 전용                              (단위:천원)

연번	구 분	예산과목		예산액	요구액		사유	비고
		세부	통계목		감	증
1	당초	징수및수용가관 리 비	일 반 운영비	175,506	8,000	-	∙신규수전 증가로 인한 검침원수수료 증가
	변경	징수및수용가관 리 비	민간이전	637,144	-	8,000
2	당초	직무 수행경비	직급보조비	82,920	1,052		∙2022년 4월, 7월분 복리후생비 예산과목 착오 지출로 인한 초과근무수당 지출분 부족에 따른 전용
			특정업무수행경비	63,600	10,000
	변경	인건비	보 수	2,911,095		11,052

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□

(단위 : 천원)

연번	사업명	사업개요	예산액	계약액 (변경액)	계약자	공사기간	변경일	변경사유
1	금강정수장 차염주입설비 설치공사	차염설비1식 건축동1동	538,000	386,708 (384,865)	바다정수산업(주)	(당초) 2022.07.11.~2022.11.07. (변경) 2022.07.11.~2023.01.02.	2022.12.12	건축인허가지연에 따른 차염설비설치공사중지 (공사중지기간: (22.10.18.~ 12.12.)

24. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□
		수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□
		누수방지계장		유수길	□

(단위 : 백만원)

연번	사업명	예산액	집행액	반납액	반납 사유	비고
1	2021년 정수시설물 정밀점검 및 정밀 안전진단용역	80 도 24 시 56	59 도 17.7 시 41.3	21 도 6.3 시 14.7	2021년 도비 보조금 집행잔액 및 이자수입 반납
2	노후상수관로 정밀조사지원사업	723 국 506 시 217	717 국 502 시 215	6 국 4 시 2	사업비 정산에 따른 집행잔액

□ 2023년도 반납 예정건

(단위 : 백만원)

연번	사업명	예산액	집행액	반납액	반납 사유	비고
1	2022년 정수시설물 정밀점검 및 정밀 안전진단용역	72 도 21.6 시 50.4	63 도 18.9 시 44.1	9 도 2.7 시 6.3	2022년 도비 보조금 집행잔액 및 이자수입 반납

26. 2022년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□
		수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

27. 2022년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		정수생산계장		손명옥	□
		급수시설계장		도일	□
		요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□
		수질실험계장		문대은	□

해  당   없  음

28. 2022년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

29. 2022년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
		급수시설계장		도일	□

(단위: 천원)

사 업 명	사업개요	예산액	사업비	집행액	공정률	미 집 행 사 유 및 금후계획
금마배수지 확충공사	금마배수지 증설 (V=5,000㎥→V=15,000㎥)	1,086,000	1,086,000	-	70%	준공시기 미도래 23년 8월 준공 예정
2021년 지방상수도 경영평가 우수기관 인센티브	2021년 경영평가 우수기관 포상금	38,000	38,000	-	-	세입처리 후 2023년 예산편성

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

31. 소송 사건 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	요금계장		김순동	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황
		원 고 (항소인)	피 고 (피항소인)	일자	관할법원
2021구합 774	인화동1가 177-12에 대한 상하수도요금 부과처분 취소청구의 소	에스에스주식회사 (대표이사 김현희)	익산시	21.04.19.	전주 지방법원	종결(‘22.12.16) 익산시 승소

32. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	요금계장		김순동	□
		누수방지계장		유수길	□

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비고
	일 자	성 명	내 용
1	2022 03.05.	장**	▪골목 노후 소화전 점검 및 정비 요청	▪점검 후 소화전 교체공사 완료
2	2022 03.10.	최**	▪계량기 이상유무 검사를 무상으로 할 수 있는지 등	▪익산시 급수조례 제29조에 의거 수도계량기 시험에 필요한 비용은 수도계량기 이상의 귀책사유가 수도사용자에게 있을 경우 수도사용자 부담, 그 외의 사항은 시장이 부담하도록 규정됨 안내
3	2022 04.10.	정**	▪원격검침 시행시기 등	▪2022년 현재 원격검침 단말기 구입설치 작업을 진행하고 있으며 2023년 원격검침 시행할 예정 안내
4	2022 04.30.	정**	▪도로 누수 발생하여 긴급 복구 요청	▪누수처 복구 공사 완료
5	2022 05.06. 06.12.	정**	▪상수도 검침시 평균량 부과요청	▪매월 정례일에 검침하며 수용가 부재등 부득이한 경우 격월 검침 안내
6	2022 06.08.	이**	▪상수도 현대화사업 시행 후 이물질 발생	▪시설물 및 관로 신설하여 해결 완료
7	2022 06.17.	한**	▪상수도요금 고지서 이메일 고지 시행 요청	▪이메일 고지 대신 스마트고지 서비스를 시행 중이며 이메일 고지는 도입 여부 검토 안내
8	2022 07.22.	김**	▪상수도 요금 다자녀 감면기준 문의	▪3명이상의 자녀를 둔 가정 중 1명 이상의 자녀가 19세 미만인 세대원인 경우임을 안내

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	요금계장		김순동	□

□ 민간위탁현황

위탁 사무명	수탁기관	위‧수탁금액	동의 관련			비 고
			의회동의여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
상수도 검 침	강순길 외 36명	581백만원	부	-	2022.01.01. ~ 2022.12.31.	단순집행적 사무로 수탁기간이 1년이하인 경우

□ 민간위탁 지도점검 현황

위탁 사무명	수탁 기관	점검 근거	점검 일자	점검 내용	지적 사항	조치 결과 (수탁기관)	비고
상수도 검 침	강순길 외 36명	익산시 공동 및 일반주택 상수도 계량기 검침업무 민간위탁 사무 처리지침	매월	관련법령 및 직무교육	-	-
상수도 검 침	강순길 외 36명	익산시 공동 및 일반주택 상수도 계량기 검침업무 민간위탁 사무 처리지침	연1회	검침원 근무평정	-	우수검침원 표창 및 재계약시 활용

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

36. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□

해  당   없  음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	누수방지계장		유수길	□

협약명	체결일자	대상	예산수반 여부	주요내용 (재정지원 등)	비고
지방상수도 현대화사업	2020. 1. 17.	한국수자원공사	여	노후상수도 정비, 스마트 관망관리 인프라 구축 등 (66,493백만원)

감사자료 과 요구사항

1. 상수도 공기업 운영 사항

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	상수행정계장		김범준	□
작성자	:	요금계장		김순동	□

□ 현      황

○ 자    산  :  182,477백만원(자본 182,105 / 부채 372)

○ 총부채액

▸ 2021. 12. 31일 기준 : 300백만원

▸ 2022. 12. 31일 기준 : 372백만원

○ 부채비율  :  0.20%(부채총계 / 자기자본 × 100)

□ 추 진 실 적

○ 요금 부과․징수 : 부과액 27,376백만원, 징수액 27,086백만원(98.9%)

○ 여유자금 효율적 관리 : 월평균 예금액 4,842백만원(연간 누적 58,100백만원)

▸ 이자수입 : 92백만원

□ 문 제 점

○ 요금 현실화율 하락 및 결함액 증가에 따른 재정 악화

구 분	연간공급량 (천㎥)	총괄원가 (백만원)	급수수익 (백만원)	결함액 (백만원)	㎥당원가 (원/㎥)	㎥당요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	비고
2022년	40,225	39,327	27,376	11,951	977.7	680.6	69.6%	결산서 기 준
2021년	40,858	37,499	27,333	10,166	917.8	668.9	72.9%	″
2020년	39,289	36,982	26,410	10,573	941.2	672.2	71.4%	″

□ 해 결 방 안

○ 상수도 요금 현실화 시민 공감대 형성으로 요금 인상 하반기 점진적 추진

2. 상수도 요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	요금계장		김순동	□

□ 부과징수 현황

(2022. 12. 31. 현재 / 단위:백만원)

구 분	예산액 (A)	조정액 (B)	징수액 (C)	체납액 (D)	징 수 비 율
					B/A	C/B
합 계	27,405.9	27,375.7	27,086.1	289.6	99.9	98.9
가 정 용	11,499.8	11,457	11,375.4	81.6	99.6	99.3
일 반 용	7,128.3	7,153.1	6,998.3	154.8	100.3	97.8
대중탕용	139.6	138.8	138.6	0.2	99.4	99.9
산업용 및 전용공업용	8,638.2	8,626.8	8,573.8	53	99.9	99.4

□ 연도별 체납액 현황

(2022. 12. 31. 현재 / 단위:백만원)

년도 업종	합 계	당해년도 (2022)	과년도
			계	2021	2020	2019	2018이전
합 계	994.6	289.6	705.0	34.8	155.2	158.9	356.0
가 정 용	125.7	81.6	44.1	17	8.3	7.5	11.3
일 반 용	287.2	154.8	132.4	14.2	11.3	15.4	91.5
대 중 탕 용	15.6	0.2	15.4	0.04	0.01	-	15.3
산업용 및 전용공업용	566.1	53	513.1	3.6	135.6	136	237.9

□ 고액체납자(30만원 이상) 행정조치 현황

(2022. 12. 31.  기준 / 단위 : 백만원)

구 분	행 정 조 치 합 계		행 정 조 치						비고
			압류예고(독촉)		압 류		단 수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	1,287	1,409.7	1,210	1,256.4	32	57.3	45	96
가 정 용	355	357.8	334	340	10	9.8	11	8
일 반 용	857	876.8	807	764	21	46.8	29	66
대중탕용	1	0.3	1	0.3	-	-	-	-
산업용 및 전용공업용	74	174.8	68	152.1	1	0.7	5	22

□ 추 진 실 적

◦ 수도계량기 조사원 직무 및 친절교육 실시 : 11회

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(2개반)

▸ 전화, 방문 체납 독려 및 단수 조치 : 15,710건(독려 15,563건 /단수 147건)

▸ 30만원 이상, 3회 이상 체납자 압류예고 : 1,210건

◦ 수도계량기 조사원(37명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

▸2회 체납 수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 문 제 점

◦ 소비자 물가상승 및 타 공공요금 인상등 시민부담 증가로 일부 수용가 체납 지속

□ 향 후 계 획

◦ 정기적인 체납액 일소 추진

▸매월 10일 한 체납 독려 : 전화, 문자, 단수예고문 부착

▸매월 20일이내 단수 추진

◦ 30만원이상 고액 체납자 지속적인 재산 압류추진

3. 유수율, 누수율 현황 및 노후관 현황

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	누수방지계장		유수길	□

□ 유수율 및 누수율 현황

구 분	총생산량 (톤)	총사용량(톤)			유수율 (%)	비 고
		계	생활용수	공업용수
2022년	54,943,798	39,304,555	32,634,418	7,590,398	73.2

※ 유수율 + 무수율 = 100%

※ 무수율: 26.8%(누수량+수도계량기 불감수량+관로공사 및 보수+공공수량(독거노인 세탁 및 화재진압 등))

누수율: 24.0%

□ 노후관 현황(교체 포함)

구 분		노후 수도관 연장(㎞)(A)	수도관 교체 연장(㎞) (B)	노후수도관 교체비율(%) [(B÷A)×100]
2022년	계	768.2	2.9	0.38%
	도 수 관	2.5
	송 수 관	20.3
	배 수 관	471.4	2.9
	급 수 관	274.0
2021년	계	771.1	0.9	0.12%
	도 수 관	2.5
	송 수 관	20.3
	배 수 관	474.3	0.9
	급 수 관	274.0

□ 개 선 방 향

◦ 노후관(전체 상수도관 39.5% 차지) 대비 낮은 교체 비율로 시비 재원 확보를 통한 단계적 교체 추진

4. 유수율 증대 사업 추진

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	누수방지계장		유수길	□

○ ○	2022년 기준 유수율 : 73.2%(2021년 환경부 통계기준, 전북 평균 유수율 74%) 2022년 목표 유수율 : 73%이상

□ 익산시 상수도관 현황

(2021년 국가상수도정보시스템 통계자료, 단위㎞)

구분	계	20년이상	20년미만	15년미만	10년미만	비고
계	1,951.7	771.1	368.8	644.1	167.7	20년이상 노후관39%
도수관	2.5	2.5
송수관	25.3	20.3	4.9		0.1
배수관	1,200.3	474.3	277.0	343.9	105.1
급수관	723.6	274.0	86.9	300.2	62.5

□ 2022년 추진실적 : 5개사업 20,345백만원

(단위:백만원)

사업명	추진실적	사업비	비 고
	5개 사업	20,345
지방상수도 현대화사업	□노후상수도 정비사업 - 기본 및 실시설계 용역 추진 □스마트 관망관리 인프라구축 - 정밀여과장치, 자동수질 측정장치 등 1차분 준공	18,305 (15,041) (3,264)
상수도관망 최적화 사업	노후관 교체 4개소 L=2.9km	700
제수변, 소화전 교체 및 정비공사	관내 변류 정비 202개소	200
긴급 누수처 복구 공사	긴급 누수처 복구 757개소	1,140

□ 개 선 방 향

◦ 지방상수도 현대화사업 완료(2024년) 후 노후관 교체 및 블록 운영을 통한 목표 유수율(85%) 제고 추진

5. 지방상수도 현대화사업

(노후상수도정비, 스마트 관망관리 인프라 구축)

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	누수방지계장		유수길	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 총사업비 : 66,493백만원

▸노후상수도 정비사업 : 60,586백만원(국 50%, 도 10%, 시 40%)

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 5,907백만원(국비 70%, 시 30%)

(단위 : 백만원)

사업명	구 분	합계	2020	2021	2022	2023	2024
합 계		66,493	8,360	14,723	18,389	12,013	13,008
소 계(100%)		60,586	8,360	12,080	15,125	12,013	13,008
노후상수도정비 사업	국 비(50%)	30,293	5,016	6,040	7,562	6,007	5,668
	도 비(10%)	6,058	836	1,208	1,512	1,201	1,301
	시 비(40%)	24,235	2,508	4,832	6,051	4,805	6,039
소 계(100%)		5,907	-	2,643	3,264	-	-
스마트 관망관리 인프라구축	국 비(70%)	4,135	-	1,850	2,285	-	-
	시 비(30%)	1,772	-	793	979	-	-

◦ 사업내용

▸노후상수도 정비사업

- 노후관교체(L=70.9km) 및 블록시스템구축(53개소), 누수탐사및복구(189.3km), 가압장 설치(2개소), 유지관리 시스템 구축 1식

▸스마트 관망관리 인프라 구축

- 정밀여과장치(17개소), 자동수질 측정장치(5개소), 소규모유량수압 감시(21개소) 등

□ 추 진 실 적

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역 추진	: 용역 중지 중(2022.11.7.)

- 블록 구축·고립 보완(시설공사 완료 및 용역 중지 해제 시까지)

▸블록시스템 구축공사 발주	: 2023. 3. ~ 4.

- 블록 구축 53개소(신흥 14, 팔봉 16, 금강 5, 왕궁 1, 금마, 11, 직결 6)

▸현대화사업 유지 관리 시스템 구축 용역 발주	: 2023. 3. ~ 5.

- 통합운영센터(관망 감시 및 관리시스템, 기존 시스템 연계 등) 구축

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸1차분 공사 추진	: 2022. 1. ~ 12.

- 소규모유량감시, 자동드레인, 정밀여과장치 등

□ 추 진 계 획

◦ 노후상수도 정비사업

▸기본 및 실시설계용역 준공	: 용역 중지 해제 이후

- 블록 구축·고립 보완

- 신흥급수구역 14개 소블록 운영 추진

▸블록시스템 구축공사 및 관망 정비공사 추진	: 2023. 6. ~ 2024. 12.

- 블록 구축 53개소, 노후관 교체(70.9km)에 대해 순차적 추진

▸현대화사업 유지 관리 시스템 구축 추진	: 2023. 5. ~ 2024. 12.

- 통합운영센터(관망 감시 및 관리시스템, 기존 시스템 연계 등) 구축 추진

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸추가분(2차) 공사 추진	: 2023. 5. ~ 12.

- 기술별 추가분(소규모유량감시 8개소, 자동드레인 14개소, 정밀여과장치 14개소 등)

6. 상수도관망 기술진단용역

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	누수방지계장		유수길	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 5.

◦ 사 업 비 : 200백만원(사고 이월)

▸계약액 193백만원, 집행액 154백만원

◦ 사업내용 : 관내 송수 및 배수 시설물(L=1,494km)에 대한 전문기술진단 1식

◦ 관계법령

▸수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등), 같은 법 시행규칙 제27조(수도시설에 대한 기술진단의 구분)에 의한 법적 의무사항(5년마다 시행)

□ 추 진 실 적

◦ 용역 발주 및 착수	: 2022. 3.

◦ 송‧배수관로 자료조사, 간접평가 및 기능평가 시행	: 2022. 4. ~ 10.

◦ 보고서 작성 및 보완	: 2022. 11. ~ 2023. 2.

◦ 환경부 보고서 승인 요청	: 2023. 3.

- 승인 지연으로 용역 중지 중(2023. 3. 6.)

□ 향 후 계 획

◦ 환경부 보고서 승인 및 준공	: 2023. 5.

7. 스마트미터 사업 추진

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	요금계장		김순동	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 3.

◦ 사 업 비 : 12,100백만원(국 8,470, 시 3,630)

◦ 사 업 량 : 38,600전(13~25mm소구경)

◦ 사업내용 : 디지털 수도미터구입 및 설치공사, 원격검침단말기 설치, 통신망 관리 서버 및 소프트웨어 구축 등

□ 추 진 실 적

◦ 디지털 수도미터 구입 및 설치공사                 : 2021. 04. ~ 11.

◦ 서버구입 및 프로그램 구축 등                     : 2021. 04. ~ 11.

◦ 무선원격검침 시스템 설치운영 중인 지자체 선진지견학     : 2022. 05.

◦ 검침단말기 구입 및 설치공사                        : 2022. 10. ~ 2023. 03.

◦ 무인원격검침 시범 운영	: 2023. 03. ~

□ 문 제 점

◦ 검침원 감원 기조 및 무선원격검침 시행에 따른 대응 인력 필요

▸ 고지서 교부 및 체납독려, 계량기 정상여부 점검(문자판불, 불회전)

▸ 누수수용가, 장기 미사용 수용가 발생시 현장  확인

□ 향 후 계 획

◦ 원격검침값 신뢰도 향상을 위한 人 검침값과 원격검침값 대조작업	: 2023. 04. ~ 07.

◦ 원격검침 시행	: 2023. 8. 이후

8. 금마배수지 확충 공사

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	급수시설계장		도일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.(4개년)

◦ 총사업비 : 8,010백만원(균특이양 70, 시비 30)

◦ 위    치  : 금마면 서고도리 산 33-6번지 금마배수지 일원

◦ 내    용  : 금마배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

□ 추 진 실 적

◦ 공 정 율 : 40%

구 분	사업비(단위:백만원)				공 종	공사내용
	합 계	도 급	관 급	폐기물
전체분	6,347	3,483	2,776	88
1 차 분	2,681	1,720	909	52	토목, 건축, 기계	토공, 기존구조물철거, 배수지구체공, 옹벽공
2 차 분	3,666	1,763	1,867	36	토목, 건축, 기계, 전기	배관공, 포장공, 가압펌프설치, 전기 및 계측제어

▸1차분 공사 착공	: 2022. 10.

- 공사기간 : 2022. 10. 25 ~ 2023. 8. 26

- 도 급 자 : ㈜ 부일건설

□ 향 후 계 획

◦ 금마배수지 확충공사 1차분 준공(토공, 옹벽공 및 구조물 시공)  : 2023. 8.

◦ 금마배수지 확충공사 2차분 착공 및 준공(배관공, 가압펌프설치등) : 2023. 8. ~ 2024. 12

9. 급수구역확장 및 급·배수관 민원공사

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	급수시설계장		도일	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용

구 분	위 치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계			2,120
급수구역 확장공사	여산면 신부마을(2차)	L=500m	100
	목천정미소~신교마을	L=400m	80
	함라면 신대마을	L=950m	190
	성당면 두동리 847번지	L=1,000m	200
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	35개소,9.4km	600
급·배수관 민원공사	익산시 일원	475개소,9.0km	950

□ 추 진 실 적

◦ 여산면 신부마을(2차) 배수관부설공사 완료	: 2022. 05.

◦ 목천정미소~신교마을 배수관부설공사 완료	: 2022. 06.

◦ 함라면 신대마을 배수관부설공사 완료	: 2022. 07.

◦ 성당면 두동리 847번지 배수관부설공사 완료	: 2022. 07.

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 완료(35개소/9.4km)	: 2022. 12.

◦ 급·배수관 민원공사 완료(475개소/9.0km)	: 2022. 01. ~ 12.

10. 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	수질실험계장		문대은	□

□ 현     황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
계	195,300	130,646	100
자체 정수	90,000	61,871	47
광역상수도	105,300	68,775	53

□ 추 진 실 적

◦ 목표 수질기준 운영 : 원수( BOD 2㎎/L이하), 정수(탁도 0.15NTU이하)

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸원수 수질검사 : 일일(4개), 주간(6개), 월간(11개), 분기(42개 ), 반기(3개)

▸정수 수질검사 : 일일(6개), 주간(7개), 월간(59개), 분기(87개)

◦ 수질검사 결과 공표 : 익산시 홈페이지, 읍‧면‧동 게시판 등

◦ 수돗물품질보고서 작성 각 세대 배포 : 50,000부

◦ 수돗물평가위원회 실시 : 2회(22.5.20 / 12.20)

□ 문 제 점

◦ 정수시설 및 상수관로 노후화로 수용가에 공급되는 수돗물에 대한 시민 불안감 상존

□ 향 후 계 획

◦ 원·정수에 대한 수질관리 강화로 안전한 수돗물 생산·공급

◦ 수돗물의 안정적 공급 및 홍보 강화로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

11. 효율적인 수도계량기 관리

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	요금계장		김순동	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.(1년)

◦ 소요예산 : 976백만원(공사비 256백만원, 계량기구입 등 720백만원)

◦ 계량기 현황                                   (2022.12.31. 기준/ 단위 : 전)

구분	계	소구경						대구경
		소계	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	소계	75mm	100mm	150mm이상
전수	64,212	63,757	49,415	7,981	4,802	1,259	300	455	230	120	105

◦ 교체방법

▸고장․동파 계량기 : 상수도과 현장팀 즉시 교체

▸노후계량기 : 상수도과 현장팀 직접 교체 및 상수도 급수공사 대행업체 시공

※ 노후계량기 교체 기준 : 소구경(∮13~50mm) 설치 8년 경과,  대구경(∮75~300mm) 설치 6년 경과

□ 추 진 실 적

◦ 노후 및 고장 계량기 등 신속 교체 : 2,990전

▸ 노후계량기 교체 : 2,339전(소구경 2,318전, 대구경 21전)

▸ 기타(동파, 고장 등) : 651전(소구경 637전, 대구경 14전)

▸ 계량기 교체현황

(2022.12.31. 기준/ 단위 : 전)

구분	계	소구경						대구경
		소계	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	소계	75mm	100mm	150mm이상
계	2,990	2,954	2,515	211	155	67	6	36	16	10	10
노후	2,339	2,318	2,075	139	52	49	3	21	13	4	4
기타	651	636	440	72	103	18	3	15	3	6	6

□ 향 후 계 획

◦ 계량기 구입 및 교체 추진                  : 2023. 1. ~ 12.

12. 정수시설 운영관리

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□

□ 사 업 개 요

◦ 정수시설 현황

▸정수장 : 2개소(신흥, 금강)

▸배수지 : 7개소(신흥, 금강, 팔봉 2, 금마, 삼기, 왕궁)

▸가압장 : 2개소(금마, 삼기)

◦ 정수공급량 : 130,646㎥/일                        (2022년 12월말 기준)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급수량 (㎥/일)	비고
계		230,300	150,531
생활용수	소 계	195,300	130,646	100%
	신흥,금강	90,000	61,871	47.4%
	광 역	105,300	68,775	52.6%
공업용수	신 흥	35,000	19,885

□ 추 진 실 적

◦ 정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 (2건/63백만원)

◦ 정수장 배수지 및 침전지 청소 (7건/117백만원)

◦ 정수장 시설물 유지관리 및 보수 (62건/433백만원)

□ 문 제 점

◦ 정수시설 장기사용으로 인한 노후화로 지속적인 개보수 필요

□ 향 후 계 획

◦ 각종 정수시설물의 보수․보강 등 체계적인 관리로 안정적 정수생산

◦ 정수시설물(침전지, 배수지) 청소로 정수처리 효율증가 및 맑은 물 공급

13. 배수지 관리 현황(배수지 현황 등)

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□

시설명	용도	위 치	시설용량 (㎥)	준공년도	비고
계			64,300		19지
신흥	생활	신흥동 산50번지	18,500	1974	4지
금강	생활	금강동 612번지	7,700	1953	5지
팔봉	생활	팔봉동852	11,250	1998	2지
	공업		8,000	1995	2지
금마	생활	금마면 서고도리 산29-7	5,000	2003	2지
삼기	공업	낭산면 용기리 1950	5,050	2012	2지
왕궁	생활	왕궁면 동용리 산70번지 일원	8,800	2017	2지

□ 추 진 실 적

◦ 상․하반기 배수지 청소용역 시행(2건/82백만원)

◦ 정수시설물 풀깍기 용역 시행(4건/59백만원)

◦ 금마 배수지 PLC교체 및 상수도 배수지 수위감지설비 설치 (18백만원)

◦ 신흥보조수원지 및 왕궁배수지 정밀안전점검 용역(24백만원)

14. 금강정수장 차염설비 설치공사

확인자	:	상수도과장		송방섭	□
작성자	:	정수생산계장		손명옥	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 1.

◦ 사 업 비 : 538,000천원(2022년 건설개량이월 420,131천원)

◦ 사업대상 : 금강정수장 소독설비

◦ 사업내용

▶ 차염설비 1식, 건축동 1동 설치

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 완료

▸차염설비 설치․건축공사 실시설계 용역 완료	: 2022. 5.

◦ 차염설비 설치공사 발주	: 2022. 5.

◦ 차염설비 설치공사(제작, 설치 등) 착공	: 2022. 7.

◦ 차염설비 건축, 전기공사 착공	: 2022. 10.

◦ 차염설비 건축, 전기공사 준공	: 2022. 12.

◦ 차염설비 설치완료 및 시범운영	: 2022. 12.

◦ 준공 및 정상 운영	: 2023. 1.