2023.  5.

제251회 익산시의회(제1차 정례회)

2023 행정사무감사자료

	상하수도사업단

하 수 도 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2022년도 업무성과 및 반성	73
				2.	2022년도 예산집행 및 추진사항	74
				3.	2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	76
				4.	2022년도 감사시 지적사항 및 조치 결과	79
				5.	5분 자유발언 조치 결과	81
				6.	시정질문에 대한 조치 결과	81
				7.	의원발의 조례 제·개정 후 추진현황	82
				8.	주요사업 조서(3천만원 이상)	83
				9.	2022년 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역	89
				10.	기금 운용 관련	90
				11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	90
				12.	용역사업 관련	91
				13.	인․허가 민원처리 관련사항	96
				14.	각종 공사 설계변경 상황	97
				15.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상)	99
				16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	102
				17.	국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)	103
				18.	지방보조금 성과평가 내역	104
				19.	2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역	105

			20.	2023년 명시 이월 내역	107
			21.	2023년도 명시이월(의회 제출) 후 2022년도에 집행한 내역	108
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 건별 집행 현황	108
			23.	공사 준공기한 연장 내역	109
			24.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	109
			25.	국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)	110
			26.	2022년도 계획사업중 미착공사업 현황	111
			27.	2022년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	111
			28.	2022년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업	112
			29.	2022년도 예산편성후 전액 미집행 내역	112
			30.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황	113
			31.	소송 사건 현황	114
			32.	시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	116
			33.	시설·사무 민간위탁 현황	119
			34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황	120
			35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업현황	120
			36.	시 산하 재단 설립 현황	121
			37.	업무협약(MOU) 등 체결 현황	121

하 수 도 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	하수도사업 공기업 운영사항	125
				2.	하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황	126
				3.	하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)	130
				4.	하수찌꺼기 감량화사업	131
				5.	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로정비사업	132
				6.	남부2-1, 2-2배수분구 하수관로정비사업	133
				7.	북부1처리분구 하수관로 정비사업	134
				8.	금마공공하수처리시설 증설	135
				9.	환경기초시설 악취개선 사업	136
				10.	익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	137
				11.	국가산업단지 노후하수관로 정비사업	138
				12.	공공하·폐수처리시설 운영관리(BTO)	139
				13.	영등지구 노후하수관로 정비사업	140
				14.	송학동 우수박스 정비사업	141
				15.	공공하·폐수처리시설 관리대행	142
				16.	소규모 하수도 시설 정비 공사	143
				17.	지하수 이용부담금 부과·징수 현황	148

감사자료 과 공통사항

1. 2022년도 업무성과 및 반성

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율 개선

‣ 남부2·3, 북부2처리분구 정비사업 완료(관로정비 1.95km, 배수설비 910개소)

‣ 남부2-1, 2-2 배수분구 정비사업 추진(관로정비 3.4km, 배수설비 718개소)

‣ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 발주

‣ 황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 추진(관로정비 0.57km, 배수설비 33개소)

‣ 하수시설 민원처리 배수설비 설치공사 34건 처리 완료

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣ 환경기초시설 악취개선사업 실시설계용역 시행을 통한 악취 저감 추진

‣ 수질측정기기 TOC교체 등 기능보강공사 추진으로 방류수질 관리 철저

◦ 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 완료

‣ 기존 소화조 개량(10,000㎥/일) 및 소화조 증설(6,692㎥/일)

‣ 협착물처리기, 농축시설 및 저류조 운영방식 개선 및 반류수처리시설 설치

◦ 읍면동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 하수도 정비공사 L=3.25km, 하수도기계준설 3,525㎥

‣ 365일 상시대기 근무로 2,723건의 하수도 생활민원처리

‣ 침수대비 및 원활한 통수를 위한 맨홀 및 하수도 준설 1,041건, 하수도 점검 및 소규모 시설 보수 1,204건

□ 반      성

◦ 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역 추진 중 재원협의 등 행정절차 지연으로 착공 지연

‣환경부 재원협의 완료되어 2022. 12월 착공

2. 2022년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□

(단위:천원,%)

장	관	항	세항	예 산 현 액						지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계(A)	2022 예산액	계속비 이월액	건설개량 이월액	사 고 이월액	예비비 사용액
하수도과				84,692,653	67,121,767	13,416,032	3,199,003	955,851		62,744,180	20,242,691		1,705,782	74.1	계속비(11,403,582) 건설개량(722,191) 사 고 (929,075)
	사업비용			37,044,357	37,044,357					36,489,495			554,862	98.5
		영업비용		36,681,145	36,681,145					36,489,495			191,650	99.5
			관거비	14,984,036	14,984,036					14,906,825			77,211	99.5
			처리장비	19,020,738	19,020,738					19,020,043			695	100
			일반 관리비	2,676,371	2,676,371					2,562,627			113,744	95.8
		예비비		363,212	363,212					0			363,212	0.0
	자본적지출			47,648,296	30,077,410	13,416,032	3,199,003	955,851		26,254,685	20,242,691		1,150,920	55.1	계속비(11,403,582) 건설개량(722,191) 사고 (929,075)
		유형자산취득		46,417,352	28,846,466	13,416,032	3,199,003	955,851		25,640,429	20,242,691		534,232	55.2	계속비(11,403,582) 건설개량(722,191) 사고 (929,075)
			구축물	45,465,859	27,894,973	13,416,032	3,199,003	955,851		24,713,680	20,242,691		509,488	54,4	계속비(11,403,582) 건설개량(722,191) 사고 (929,075)
			기계장치	433,493	433,493					429,096			4,397	99.0
			공기구비품	350,000	350,000					335,808			14,192	95.9
			건설중 인자산	168,000	168,000					161,845			6,155	96.3
		비가동설비 자산취득		615,000	615,000					609,000			6,000	99.0
			건설중인자산	615,000	615,000					609,000			6,000	99.0
		기타자본적 지출		5,400	5,400					5,256			144	97.3
			정부보조금 반환	5,400	5,400					5,256			144	97.3
		예비비		610,544	610,544					0			610,544	0.0

(참고) 2022년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	예 산 액	지 출 액	비 율	부 진 사 유
1	화평마을오수관로 설치공사	500,000	65,749	13.1	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
2	함열읍 와리 우수박스 설치공사 설계비	45,000	0	0	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
3	송학동 배수설비 설치공사	272,000	57,861	21.3	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
4	관내 분류식 배수설비 설치공사	900,000	488,045	54.2	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
5	익산시노후하수관로 정밀조사용역 (3단계)	397,000	0	0	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
6	지하시설물 지반탐사	130,000	57,000	43.8	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
7	읍면동주민편익사업	335,000	0	0	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
8	익산공공하수탄소중립 프로그램 태양광설치	1,709,000	0	0	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
9	송학동우수박스 정비사업	1,000,000	28,499	2.8	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
10	금마면 용순길 226주변 하수관로 정비공사	100,000	0	0	‧ 민원발생으로 실시설계 변경후 사업 추진 예정
11	익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	1,145,000	0	0	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
12	익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계)	161,754	103,905	64.2	‧ 준공시기 미도래(2023. 준공예정)
13	익산시 환경기초사업 악취개선사업	667,000	220,041	33.0	‧ 실시설계 용역중
14	익산 남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업	6,374,154	2,739,292	43	‧ 시설공사 추진중(공정 23%)
15	북부 1 처리분구 하수관거 정비사업	2,108,839	14,000	0.69	‧ 2023년 착공 예정
16	흥왕 소규모 하수처리시설	429,000	239,398	55.6	‧ 준공시기 미도래
17	익산 금마 공공하수처리시설 증설	157,000	0	0	‧ 민원발생으로 실시설계용역 변경후 사업추진 예정
18	국가산업단지 노후하수관로 정비사업	1,214,960	912,099	43.3	‧ 준공시기 미도래
19	영등지구 노후하수관로 정비사업	550,000	322,656	58.7	‧ 준공시기 미도래
20	익산시 노후하수관로 정비사업	443,292	150,642	34.0	‧ 낙찰 차액 및 집행잔액
21	송학동 침수예방사업 타당성 조사 용역	100,000	59,673	59.7	‧ 낙찰 차액 및 집행잔액

3. 2022년도 행정사무감사 시 지적사항에 대한 조치 결과

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
계	11건
1	•하수도 요금 현실화 관련 ▸하수도 사용료 수익이 2019년 이후 점차 감소하고 있으며 현실화율도 떨어지고 있는데, 원가 절감 등을 통해서 현실화율을 올리는 방안을 검토하기 바람 ▸코로나로 인해 요금 동결이 되고 있으나 장기적으로는 하수도 재정에 악영향이 예상됨에 따라 요금 인상 방안을 장기적으로 검토하기 바람	▸현재 정부의 공공요금 인하 정책에 따라 하수도 사용료 인상이 어려운 상황으로 생활물가가 안정화된 후 하수도 현실화율이 개선될 수 있도록 장기적으로 추진하겠음
2	•하수도 요금 부과징수 및 체납액 관련 ▸하수도 요금은 상수도 사용량에 따른 부과와 지하수 사용자에 대한 부과 이렇게 2가지로 부과되고 있으나, 전체적으로 체납액이 늘어나고 있는 상황으로 체납액 징수를 위한 노력을 강화하기 바라며, 추후 보고서 작성 시 상수도와 지하수를 구분하여 작성하기 바람	▸고액 및 상습체납자에 납부 독려하여 체납액을 징수하였고(8,358천원), 지속적인 방문, 유선 등으로 납부 독려하겠음 ▸하수도 사용료 현황을 상수도와 지하수로 구분하여 작성하였음
3	•행정사무감사 보고서 작성 관련 ▸의회에서 요구한 보고서 작성양식에 맞게 보고서가 작성될 수 있도록 시정하기 바람 ▸주요사업, 용역사업에 예산액 대비 용역비, 집행액을 표시하여 집행현황을 확인할 수 있도록 서식을 변경하기 바람	▸의회에서 요구한 보고서 양식에 맞게 보고서를 작성하였음 ▸용역사업 집행현황을 확인할 수 있도록 서식을 변경하였음
4	•집행잔액 및 명시이월예산 관련 ▸예산 집행 실적이 저조하여 집행잔액이 과도하게 발생되고 있으며 그에 따라 명시이월 예산이 많이 발생하고 있는바, 예산의 효율성을 위하여 적정하게 예산이 편성되어 이월 예산이 최소화 될 수 있도록 노력하기 바람	▸명시이월 예산이 최소화될 수 있도록 노력하겠음
5	•하수도 원인자부담금 관련 ▸타 시군은 원인자부담금 단가산정 방식과 관련하여 2020년도에 조례를 개정하였는바, 우리시도 조례 개정을 검토하기 바람	▸2023년 9월 원인자부담금 단가산정 방식 관련 조례 개정 추진 예정임
6	•구도심 일부 오·우수관 분류 공사 관련 ▸구도심 악취 관련 일부 민원은 지대가 낮거나 건물 안쪽에 있는 등 오·우수관 분류공사를 할수 없어서 발생하고 있으나, 시공 여건이 수반된다면 시에서 적극적으로 해결할 수 있도록 노력하기 바람	▸공사 추진 중 구도심 일부 지역은 지대가 낮거나 건물 안쪽에 있어 시공 자체가 불가능한 경우로 향후 건물주에 의해 여건이 변경되어 시공이 가능하다면, 토지소유자의 토지 사용 승낙 등의 행정절차를 수행하여 공사를 추진할 수 있도록 노력하겠음
7	•시정질문에 대한 조치결과 관련 ▸용제동 용연마을 침수문제와 관련하여 하수도과에서는 처리가 불가하다 답변하였으나, 침수문제를 익산시에서 해결해달라고 요청한 사항으로 하수도과와 미래농업과, 농어촌공사간 협의를 통해 침수문제가 해결될수 있도록 노력하기 바라며 조치결과는 별도로 보고하기 바람	▸배수로 정비공사 착공 예정임 (23.04.11.)
8	•금마공공하수처리장 증설 관련 ▸금마공공하수처리장 증설시 인구증가 등 지역개발 여건을 종합적으로 반영하여 처리용량 부족으로 추가로 증설되는 일이 없도록 하기 바람	▸하수도정비기본계획(변경)에 따른 금마처리구역 일부 조정 편입 하수량에 대해 북부처리구역 처리시설로 연계처리 방안 마련 후 실시설계용역을 추진 중에 있음
9	•북부2처리분구 관련 ▸신용동 도치마을 오수관로 민원이 해결 될수 있도록 조속한 조치 바람	▸신용동 도치마을은 남부2,3 북부2처리분구 하수관로 정비사업으로 분류식 배수설비 사업을 시행하려고 했으나 건물주의 반대로 공사를 시행하지 못한 사항으로 향후 건물주의 공사 시행 여건 변동이 있으면 긍정적으로 검토하겠음
10	•공공하수처리시설 운영관리 관련 ▸공공하수처리시설 운영관리(BTO) 사업으로 고정비과 변동비를 지급하고 있으므로 지속적인 모니터링과 관리를 통해 예산의 낭비되는 일이 없도록 노력하기 바람	▸실시협약에 따라 매월 사용료 지급시 관련 서류 등을 철저히 검토하고 운영에 대해 지속적인 점검 및 관리를 통해 예산 낭비가 되지 않도록 하겠음
11	•빗물저금통 사업 관련 ▸취지가 굉장히 좋은 사업임에도 불구하고 신청율이 저조한바, 시민들에게 적극적인 홍보를 통해 사업이 활성화 될 수 있도록 노력하기 바람	▸공고(5회)와 보도자료 등 홍보를 통하여 3개소, 총 9백만원의 지원금을 교부하였음

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□

4. 2022년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
1	민원처리 기간연장 문서 미통지	▸추후 재발방지를 위해 노력하겠음	특정감사
2	복무규정 준수 소홀	▸추후 재발방지를 위해 노력하겠음	종합감사
3	관용차량 정비내역 미등재	▸관용차량 정비 내역을 새올 시스템 차량정비대장 등재 완료함	종합감사
4	공공하폐수처리시설 관리대행 계약 체결 내역 등 미공개	▸미공개된 계약 건에 대해 공개 처리 완료하였으며 추후 재발방지를 위해 노력하겠음	종합감사
5	시책추진업무추진비 집행에 관한 사항	▸추후 재발방지를 위해 노력하겠음	종합감사
6	일상경비 지출 및 공공조달유류카드 사용 포인트 관리 소홀	▸세입조치 완료함	종합감사
7	공인 인영의 인쇄사용 사전승인 미이행	▸추후 재발방지를 위해 노력하겠음	종합감사
8	민간보조사업 정산검사보고 미실시	▸정산검사보고 실시 완료함	종합감사
9	지하수 이용 부담금 체납관리 소홀	▸현장 방문 및 압류예고를 통해 납부를 독려하여 지하수 이용 부담금 체납액 감소를 위해 노력하도록 하겠음	종합감사
10	지하수 개발 이용 허가 및 신고관리 소홀	▸지속적인 지하수 관리와 보전을 위해 지하수 개발 이용 허가 및 신고관리를 철저하게 하도록 하겠음	종합감사
11	시설공사 하자검사 업무 소홀	▸22년 미실시 하자검사 이행 완료함	종합감사
12	시설공사 계약심사 미이행	▸추후 재발방지를 위해 노력하겠음	종합감사
13	산업안전보관리비 정산 부적정	▸환수금 여입 완료함	종합감사
14	도로점용(굴착)허가 관련 행정절차 이행 소홀	▸추후 재발방지를 위해 노력하겠음	종합감사

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

6. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□

연번	시정질문사항	조치(처리)결과	비고
1	▪익산시 금강동 환경기초시설 이전 용역 검토 필요성에 대하여	▪금강동 익산공공하수처리시설은 사업시행자인 전북엔비텍의 관리운영권이 ‘28년 6월까지이며, 이후 관리방안은 관련법에 따라 운영권 만료 3년전 관리이행계획을 수립하여 KDI공공투자관리센터 검토 후 기재부와 협의하여 결정해야 하는 사항임

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

8. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

					(단위 : 천원, %)
연번	사 업 명	사업개요	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
	계	49건	22,075,878	11,378,806	10,697,072	51.5
1	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업	·사업기간 : 2019.05.~2022.09. ·총사업비 : 35,120,000천원 ·사 업 량 : 오수관로 L=29.67km, 배수설비 2,288가구, 맨홀펌프장 15개소	7,984,345	4,855,999	3,128,346	60.8
2	익산남부 2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업	·사업기간 : 2021.09.~2024.12. ·총사업비 : 37,386,000천원 ·사 업 량 : 오수관로 0.752km, 배수설비 669가구	6,374,154	2,739,292	3,634,862	43.0
3	2022년 하수시설 민원 처리공사 단가계약(2차)	·사업기간 : 2022.02.~2022.06. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 아스팔트 포장절단 외 36개 공정	49,000	49,000	0	100
4	황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사	·사업기간 : 2022.04.~2023.06. ·총사업비 : 600,000천원 ·사 업 량 : 오수관로 L=573m, 배수설비 33가구, 맨홀펌프장 1개소 등	600,000	253,681	346,319	42.3
5	금마면 용순길 22-6 주변 하수관로 설치공사	·사업기간 : 2022.05.~2022.08. ·총사업비 : 47,000천원 ·사 업 량 : 우수관로(D600 L=150m, D300 L=106m) 맨홀 9개소	47,000	0	47,000	0
6	2022년 도시숲 조성사업 우수관로 설치공사	·사업기간 : 2022.07.~2022.12. ·총사업비 : 119,741천원 ·사 업 량 : 오수관로 0.419km, 집수정 8개소	119,741	119,741	0	100
7	송학동 배수설비 설치공사	·사업기간 : 2022.08.~2023.02. ·총사업비 : 272,000천원 ·사 업 량 : 오수관로, 집수정 8개소, 조립식PC맨홀설치10개소, 배수설비 32가구	272,000	57,861	214,139	21.3
8	화평마을 오수관로 설치공사	·사업기간 : 2022.10.~2023.10. ·총사업비 : 500,000천원 ·사 업 량 : 오수관로 0.16km, 배수설비 45가구	500,000	65,749	434,251	13.1
9	송학동 우수박스 정비공사	·사업기간 : 2022.12.~2023.12. ·총사업비 : 476,850천원 ·사 업 량 : 우수박스 L=284m	476,850	244,900	231,950	51.4
10	남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 수밀시험용역	·사업기간 : 2022.01.~2022.09. ·총사업비 : 153,045천원 ·사 업 량 : CCTV촬영 25,072.5m, 맨홀부공기압시험 698개소, 공기압시험 702개소 등	153,045	153,045	0	100
11	익산남부2-1, 2-2배수분구하수관로 정비사업 수밀시험 용역	·사업기간 : 2022.02.~2023.02. ·총사업비 : 46,600천원 ·사 업 량 : CCTV조사 70개소, 연막시험 335개소 등	46,600	46,600	0	100
12	남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 폐기물처리용역(준설토처리)	·사업기간 : 2022.04.~2025.04. ·총사업비 : 69,432천원 ·사 업 량 : 하수준설토 721톤	69,432	0	69,432	0
13	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 건설폐기물 처리용역	·사업기간 : 2022.02.~2022.09. ·총사업비 : 121,847천원 ·사 업 량 : 폐콘크리트, 폐아스콘 처리	121,847	121,847	0	100
14	흥왕 소규모하수처리시설 신설사업 기본 및 실시설계용역	·사업기간 : 2022.08.~2023.03. ·총사업비 : 294,800천원 ·사 업 량 : 하수관로 L=5.65km, 소규모 하수처리장 1개소(Q=145㎥/일)	294,800	235,840	58,960	80
15	화평 소규모하수처리시설 폐쇄 및 연계공사 기본 및 실시설계용역	·사업기간 : 2022.08.~2022.11. ·총사업비 : 44,420천원 ·사 업 량 : Q=49㎥/일 폐쇄, 배수설비 조사 95개소, 오수관로 0.69km 신설	44,420	44,420	0	100
16	익산남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 폐기물 처리용역	·사업기간 : 2022.07.~2023.07. ·총사업비 : 87,420천원 ·사 업 량 : 폐콘크리트, 폐아스콘 처리	87,420	0	87,420	0
17	익산남부2-1, 2-2배수분구하수관로 정비사업 수밀시험용역	·사업기간 : 2022.07.~2023.07. ·총사업비 : 78,980천원 ·사 업 량 : 하수관공기압시험 903개소, 맨홀공기압시험 342개소, 연막시험 5,243개소	78,980	0	78,980	0
18	송학동 학곤로 일원 우수박스 정비공사 실시설계용역	·사업기간 : 2022.11.~2023.02. ·총사업비 : 41,252천원 ·사 업 량 : 우수박스 정비 L=380m	41,252	0	41,252	0
19	익산남부2-1, 2-2배수분구하수관로 정비사업 건설사업관리 용역	·사업기간 : 2022.12.~2023.10. ·총사업비 : 684,800천원 ·사 업 량 : 건설사업관리용역 1식	684,800	0	684,800	0
20	송학동 우수박스 정비공사 건설폐기물처리용역	·사업기간 : 2022.12.~2023.12. ·총사업비 : 49,950천원 ·사 업 량 : 폐아스콘 898톤, 폐콘크리트 545톤	49,950	0	49,950	0
21	환경기초시설 악취개선사업 실시설계용역	·사업기간 : 2022.06.~2022.12. ·총사업비 : 367,500천원 ·사 업 량 : 실시설계용역 1식	367,500	217,490	150,010	59.2
22	공공하폐수처리시설 수질TMS유지관리용역	·사업기간 : 2022.01.~2022.12. ·총사업비 : 433,493천원 ·사 업 량 : 익산공공, 북부, 함열, 금마, 국가식품클러스터, 제3산단	433,493	429,096	4,397	99
23	익산공공하수처리시설 태양광발전시설 설치사업실시설계용역	·사업기간 : 2022.08.~2022.11. ·총사업비 : 69,678천원 ·사 업 량 : 실시설계용역 1식	69,678	0	69,678	0
24	2022년 1분기 하수도민원 처리공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.01.~2022.05. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 하수도시설물 관련 118개 공종	49,000	47,143	1,857	96.2
25	2022년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.01.~2022.05. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,090	1,910	96.1
26	2022년 상반기 하수도기계 준설공사 단가계약(3차)	·사업기간 : 2022.01.~ 2022.05. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,303	1,697	96.5
27	목천동 우수박스 설치공사	·사업기간 : 2022.02.~2022.05. ·총사업비 : 124,200천원 ·사 업 량 : PC암거 L=77m	124,200	124,198	2	99.9
28	2022년 도민제안사업 망성면 하수관로 정비공사 (교향마을 외 2개마을)	·사업기간 : 2022.04.~2022.06. ·총사업비 : 45,280천원 ·사 업 량 : 3개마을 하수관로 정비	45,280	43,548	1,732	96.2
29	2022년 2분기 하수도기계 준설공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.05.~2022.08. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,300	1,700	96.5
30	2022년 2분기 하수도기계 준설공사 단가계약(3차)	·사업기간 : 2022.05.~2022.08. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,461	1,539	96.9
31	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(6차)	·사업기간 : 2022.05.~2022.08. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 하수도시설물 관련 118개 공종	49,000	47,366	1,634	96.7
32	2022년 주민참여예산 민원처리공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.03.~2022.07. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 하수도시설물 관련 118개 공종	49,000	47,413	1,587	96.8
33	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.07.~2022.11. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,456	1,544	96.8
34	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	·사업기간 : 2022.07.~2022.10. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,312	1,688	96.6
35	2022년 하반기 맨홀 보수공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.07.~2022.12. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 맨홀보수 16개 공종	49,000	47,364	1,636	96.7
36	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	·사업기간 : 2022.08.~2022.12. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 하수도시설물 관련 118개 공종	49,000	42,846	6,154	87.4
37	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(3차)	·사업기간 : 2022.08.~2022.12. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 하수도시설물 관련 118개 공종	49,000	47,524	1,476	97
38	2022년 3분기 하수도기계 준설공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.09.~2023.01. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,313	1,687	96.6
39	2022년 3분기 하수도기계 준설공사 단가계약(2차)	·사업기간 : 2022.09.~2023.01. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,105	1,895	96.1
40	2022년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	·사업기간 : 2022.10.~2023.02. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 하수도시설물 관련 118개 공종	49,000	47,105	1,895	96.1
41	2022년 4분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.11.~2023.03. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,105	1,895	96.1
42	2022년 4분기 하수도기계 준설공사 단가계약(2차)	·사업기간 : 2022.11.~2023.03. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 준설, 폐기물위탁	49,000	47,316	1,684	96.6
43	성당면 와초리 164-2번지외 1개소 하수관로 정비공사	·사업기간 : 2022.11.~2023.01. ·총사업비 : 32,846천원 ·사 업 량 : 면벽설치 L=85m	32,846	32,846	0	100
44	모현동 456-18번지일원 하수관로 정비공사	·사업기간 : 2022.11.~2023.01. ·총사업비 : 30,285천원 ·사 업 량 : 하수관로 L=131m	30,285	26,829	3,456	88.6
45	2022년 동절기 맨홀 보수공사 단가계약(1차)	·사업기간 : 2022.12.~2023.05. ·총사업비 : 49,000천원 ·사 업 량 : 맨홀보수 16개 공종	49,000	0	49,000	0
46	익산 국가산업단지 노후하수관로 정비사업	·사업기간 : 2022.12.~2024.12. ·총사업비 : 13,555,000천원 ·사 업 량 : 오수관로 L=6.5km, 우수관로 L=6.9km 등	1,214,960	21,670	1,193,290	1.8
47	익산시 남부처리분구 공공 하수관로 기술진단용역	·사업기간 : 2022.03~2022.09. ·총사업비 : 100,000천원 ·사 업 량 : 기술진단용역 1식	100,000	96,000	4,000	96
48	영등지구 노후하수관로 정비사업 실시설계용역	·사업기간 : 2022.05~2023.05. ·총사업비 : 550,000천원 ·사 업 량 : 실시설계용역 1식	550,000	484,726	65,274	88.1
49	2022년 익산시 하수도 지반탐사용역(GPR탐사)	·사업기간 : 2022.11.~2023.02. ·총사업비 : 130,000천원 ·사 업 량 : 지반탐사용역 1식	130,000	114,906	15,094	88.4

9. 2022년도 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

건 명	내 용	진정인	조치 사항	처 리 결 과
계	5건
함열읍 와리 집단민원 (2022. 01. 25.)	생활하수와 배수가 원활하게 될 수 있도록 개선 요청	소**외 26명	완료	함열읍 와리 324-8번지 일원 우수박스 설치 예정
왕궁온천 도시개발사업 개발계획 관련 민원 (2022. 04. 26.) (2022. 06. 08.) (2022. 08. 10.)	조합장 자격, 조합장 가족 임원 임명 및 조합총회 소집 안내문을 보낸 행위에 대한 조합총회 무효 요청	한**	완료	자격과 임원 임명 사항은 도시개발법 14조 및 6장 벌칙 사항에 해당하지 않고 안내문을 보낸 행위도 사실고지로 볼수 있음
선화로14길 10-20번지 일원 오수공사 요청 (2022. 11. 22.)	악취 및 누수 피해로 오수관로 공사 요청	박**외 11명	완료	비용부담 협의 및 확인서 작성 시 지원 가능 답변
2022년 도시숲 조성사업 우수관로 설치공사 (2022. 11. 25.)	도시숲 조성 우수관로 공사 설계변경 의견 제시	이**외 3명	완료	의견 반영하여 설계 변경 후 공사 완료
화평마을 오수관로 설치공사 (2022. 12. 12.)	오수관로 설치공사 부분 도로 전체 포장 요청	하**외23명	완료	오수관로 설치 부분 전체 포장 완료

10. 기금 운용 관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

12. 용역사업 관련

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 용역사업 추진 현황

(단위 : 천원)

용역구분	용 역 명	예산액	계약금액	집행액	용역업체	계약방법	비고
계	40건	3,630,342	3,468,781	2,121,211
일반 용역	2022년 유천생태습지 청소용역	19,710	19,710	19,710	중앙종합공사	1인수의
기술 용역	남부2.3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 수밀시험 용역	153,045	153,045	153,045	㈜씨엔코리아 (유)엠제이이엔씨	일반경쟁
기술 용역	익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 수밀시험 용역	46,600	46,600	46,600	(유)한국티엠에스	일반경쟁	장기
기술 용역	남부 2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 폐기물처리용역(준설토처리)	69,432	69,432	0	(유)천만금	2인이상견적수의
기술 용역	황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 폐기물처리용역	17,669	17,669	17,669	(유)진영환경	1인수의
기술 용역	금마면 용순길 22-6 주변 하수관로 설치공사 폐기물처리용역	5,099	5,099	0	(유)도형	1인수의
기술 용역	황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 CCTV촬영및 수밀시험용역	14,957	14,957	0	(유)미래건설	1인수의
기술 용역	황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 GIS DB구축용역	9,000	9,000	0	㈜동운	1인수의
기술 용역	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역	121,847	121,847	121,847	㈜초당산업	일반경쟁
기술 용역	흥왕 소규모하수처리 시설 신설사업 기본 및 실시설계용역	294,800	294,800	235,840	㈜범한엔지니어링	일반경쟁
기술 용역	화평소규모하수처리시설 폐쇄 및 연계공사 기본 및 실시설계용역	44,420	44,420	44,420	㈜태원엔지니어링	2인이상견적수의
기술 용역	송학동 배수설비 설치공사 폐기물처리용역	17,286	17,286	17,286	㈜류한환경	1인수의
기술 용역	송학동 배수설비 설치공사 CCTV촬영 및 수밀시험용역	9,380	9,380	9,380	태광건설(주)	1인수의
기술 용역	익산 남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 CCTV조사용역	25,080	25,080	0	도원환경건설(주)	일반경쟁	장기
기술 용역	익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 폐기물처리용역	87,420	87,420	0	백진환경	일반경쟁	장기
기술 용역	익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 수밀시험용역	78,980	78,980	0	(유)한국티엠에스	일반경쟁	장기
기술 용역	송학동 배수설비 설치공사 GIS DB 구축용역	7,686	7,686	7,686	㈜드림공간정보	1인수의
기술 용역	2022년 유천생태습지 해충방제용역	9,433	9,433	9,433	(유)현대그린환경	1인수의
기술 용역	송학동 학곤로 일원 우수박스 정비공사 실시설계용역	41,252	41,252	0	㈜한가람	2인이상견적수의
기술 용역	화평마을 오수관로 설치공사 CCTV촬영 및 수밀시험용역	3,702	3,702	0	(유)산야	1인수의
기술 용역	화평마을 오수관로 설치공사 폐기물처리용역	12,345	12,345	0	(유)가나환경	1인수의
기술 용역	화평마을 오수관로 설치공사 GIS DB구축용역	10,593	10,593	0	(유)산야	1인수의
기술 용역	송학동 우수박스 정비공사 설계안전성 검토용역	6,390	6,390	0	㈜동운	1인수의
기술 용역	황등면 황방1마을 배수설비 설치공사 폐기물처리용역(2차)	19,410	19,410	0	(유)진영환경	1인수의
기술 용역	익산 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 건설사업관리 용역	684,800	684,800	0	동부엔지니어링㈜	일반경쟁
기술 용역	송학동 우수박스 정비공사 GIS DB구축용역	15,534	15,534	0	(유)산야	1인수의
기술 용역	송학동 우수박스 정비공사 건설폐기물처리용역	49,950	49,950	0	(유)초록환경	2인이상견적수의
기술 용역	환경기초시설 악취개선사업실시설계용역	367,500	310,700	217,490	㈜도화엔지니어링	일반경쟁
기술 용역	공공하폐수처리시설 수질TMS 유지관리용역	433,493	429,096	429,096	㈜서인지엔티	일반경쟁
기술 용역	익산공공하수처리시설 태양광발전시설 설치사업 실시설계용역	69,678	61,456	0	(유)광진이엔지	2인이상견적수의
기술 용역	2022년 도비지원사업 외 하수관로 정비공사 실시설계용역	21,322	19,189	19,189	㈜동운	1인수의
기술 용역	2022년 상반기 하수도 CCTV 촬영용역 단가계약	22,000	22,000	22,000	(유)보건	1인수의
기술 용역	익산시 남부처리분구 공공 하수관로 기술진단용역	100,000	96,000	96,000	㈜자연과환경	2인이상견적수의
기술 용역	2022년 도민제안사업 망성면 하수관로 정비공사 (교향마을 외 2개마을) 건설폐기물처리용역	7,689	6,920	6,920	㈜에코건설산업	1인수의
기술 용역	평화동 248-1번지 인근 하수관로 정비공사 건설폐기물 처리용역	3,201	1,094	1,094	㈜일진도시환경	1인수의
기술 용역	영등지구 노후하수관로 정비사업 실시설계용역	550,000	484,726	484,726	㈜삼안	일반경쟁
기술 용역	2022년 하반기 하수도 CCTV 촬영용역 단가계약	22,000	22,000	22,000	㈜신성토건	1인수의
기술 용역	모현동1가 456-18 인근 하수관로 정비공사 외 5개소 실시설계용역	21,160	19,044	19,044	㈜우향이앤씨	1인수의
기술 용역	2022년 익산시 하수도 지반탐사용역(GPR탐사)	130,000	114,906	114,906	(유)가온기술	일반경쟁
기술 용역	모현동 456-18번지 일원 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	6,479	5,830	5,830	㈜일진도시환경	1인수의

□ 용역비 미집행 사업 추진 현황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	사업비	집행액	추진현황	비고
기술	익산공공하수처리시설 태양광발전시설 설치사업 실시설계용역	61,456	0	실시설계 추진중으로 전북환경청과 설치 위치 및 용량 협의완료(‘23.3.)로 ’23.4. 발주예정

□ 용역사업 중 사전 기술심사를 하여 참가자격 제한 사례

해    당    없    음

□ 각종 용역사업 중 실제사업에 적용시키지 못하고 사장하고 있는 용역현황

해    당    없    음

□ 각종 용역 사업 중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례

해    당    없    음

13. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당   없  음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

일자	사 업 명	사업개요	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증감
계	14건		25,992	25,547	445
2022. 05.03.	남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업 (전체분 2회, 1차분 2회)	오수관로 3.54km, 배수설비 1,649가구	1,542	1,936	394	㈜한반도건설	2021.09. ~ 2022.11.	공사계획 변경에 따른 관급자재 소요 수량 변경
2022. 06.30.	남부2,3 북부2처리분구 하수관로 정비사업 (전체분6회,4차분1회)	오수관로 L=29.84km, 배수설비 2,702가구, 맨홀펌프장 17개소	5,068	5,013	△55	㈜성지건설	2021.01. ~ 2022.09.	사유지간섭으로 맨홀펌프장 삭제 외 현장여건 반영 설계변경
2022. 09.06.	남부2,3 북부2처리분구 하수관로 정비사업(전체분7회,4차분2회)	오수관로 L=29.67km, 배수설비 2,288가구, 맨홀펌프장 15개소	5,013	3,920	△1,093	㈜성지건설	2022.01. ~ 2022.09.	지장물 간섭, 민원 추가반영 및 수량감소, 실시공 정산반영
2022. 11.11.	남부2-1,2-2배수분구 하수관로 정비사업 (전체분 3회, 1차분 3회)	오수관로 L=3.22km 배수설비 1,692가구	1,936	2,013	77	㈜한반도건설	2021.09. ~ 2022.11.	물가변동 및 현장여건 반영
2022. 11.29.	2022년 도시숲 조성사업 우수관로 설치공사	되메우기및다짐 V=731㎥ PE이중벽관 D300 L=66m 수도관이설 1개소	40	57	17	㈜효동건설	2022.07. ~ 2022.12.	민원사항 및 현장여건 반영
2022. 12.30.	송학동 배수설비 설치공사	배수설비 32가구	33	29	△4	㈜영광건설	2022.08. ~ 2023.01.	타부서 협의내용 및 민원사항 반영
2022. 11.16.	익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 전기계측공사	전기계측제어 1식	1,483	1,579	96	㈜세움지	2019.08. ~ 2022.11.	물가변동(ES) 및 현장여건 반영 (기계설비위치 변경 등)
2022. 11.24.	익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업	-기존소화조 개량 (10,000㎥/일) 및 증설(6,692㎥/일) -탈취시설, 가스 저장소 및 탈황 설비 노후 교체 등	10,627	10,750	123	㈜금도건설	2019.08. ~ 2022.11.	물가변동(ES) 및 현장여건반영 (배관위치 조정 등)
2022. 04.11.	목천동 우수박스 설치공사	PC박스 L=71m	119	124	5	(유)남성건설	2022.02. ~ 2022.05.	기초잡석 및 기초 콘크리트물량증가
2022. 06.14.	용안면 성동마을 배수로 복개공사	배수로 복개	18	21	3	㈜성운건설	2022.05. ~ 2022.06.	펜스철거 및 재설치
2022. 06.27.	평화동 248-1번지인근 하수관로 정비공사	하수관로 정비	18	16	△2	(유)송광토건	2022.04. ~ 2022.06.	공사구간 물량축소
2022. 06.27.	평화동 248-1번지 인근 하수관로 정비공사 건설폐기물처리용역	폐기물처리	3	1	△2	㈜일진도시환경	2022.05. ~ 2022.06.	공사구간 물량축소
2022. 12.16.	모현동 456-18번지 하수관로 정비공사	하수관로 정비	61	55	△6	(유)청우건설	2022.11. ~ 2023.01.	암반구간 관로 구경 변경
2022. 12.29.	성당면 와초리 164-2번지 하수관로 정비공사	하수관로 정비	31	33	2	(유)우석건설	2022.11. ~ 2023.01.	면벽설치 구간변경

(단위 : 백만원)

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	집행액	시공회사
계	32건		18,750	9,433
남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 L=29.67km, 배수설비 2,288가구, 맨홀펌프장 15개소	2019.05.~2022.09.	7,984	4,856	성지건설(주) ㈜삼안
익산남부 2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업	오수관로 0.752km, 배수설비 669가구	2021.09.~2023.07.	6,374	2,739	㈜한반도건설
2022년 하수시설 민원 처리공사 단가계약(2차)	하수시설공사 37개 공종	2022.02.~2022.06.	49	49	태광건설(주)
황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사	오수관로 L=573m, 압송관로 L=258m, 배수설비 33가구, 맨홀펌프장 1개소	2022.04.~2023.06.	600	254	바다정수산업(주)
금마면 용순길 22-6 주변 하수관로 설치공사	우수관로 (D600 L=150m, D300 L=106m) 맨홀 9개소	2022.05.~2022.08.	47	0	(유)미래건설
2022년 도시숲 조성사업 우수관로 설치공사	PE이중벽관 L=419m, 집수정 8개소	2022.07.~2022.12.	120	120	(유)효동건설
송학동 배수설비 설치공사	오수관로,집수정8개소 조립식PC맨홀설치 10개소, 배수설비 32가구	2022.08.~2023.02.	272	58	㈜영광건설
화평마을 오수관로 설치공사	오수관로 L=160m, 배수설비 L=306m 배수설비 45가구	2022.10.~2023.10.	500	66	(유)태강건설
송학동 우수박스 정비공사	우수박스(2.0x1.5) L=284m	2022.12.~2023.12.	476	245	보성건설(유)
2022년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도 민원처리	2022.01.~2022.05.	49	47	㈜성민건설
2022년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도 기계준설	2022.01.~2022.05.	49	47	(유)엠제이이엔씨
2022년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(3차)	하수도 기계준설	2022.01.~2022.05.	49	47	㈜삼일공사
목천동 우수박스 설치공사	우수박스 설치	2022.02.~2022.05.	124	124	(유)남성건설
2022년 도민제안사업 망성면 하수관로 정비공사 (교향마을 외 2개마을)	하수관로 정비	2022.04.~2022.06.	45	44	㈜부경건설
2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(6차)	하수도 민원처리	2022.05.~2022.08.	49	47	(유)대명건설
2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도 기계준설	2022.05.~2022.08.	49	47	(유)광우건설
2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(3차)	하수도 기계준설	2022.05.~2022.08.	49	47	(유)대길환경
2022년 주민참여예산 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도 민원처리	2022.03.~2022.07.	49	47	(유)주신테크
2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도 기계준설	2022.07.~2022.11.	49	47	(유)대길환경
2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도 기계준설	2022.07.~2022.10.	49	47	(유)신안건설
2022년 하반기 맨홀보수 공사 단가계약(1차)	하수도 맨홀보수	2022.07.~2022.12.	49	47	(유)태우건설
2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도 민원처리	2022.08.~2022.12.	49	43	㈜성원건설
2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도 민원처리	2022.08.~2022.12.	49	48	㈜성운건설
2022년 3분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도 기계준설	2022.09.~2023.01.	49	47	(유)이레건설
2022년 3분기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도 기계준설	2022.09.~2023.01.	49	47	(유)엠제이이엔씨
2022년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도 민원처리	2022.10.~2023.02.	49	47	(유)성지토건
2022년 4분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도 기계준설	2022.11.~2023.03.	49	47	(유)엠제이이엔씨
2022년 4분기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도 기계준설	2022.11.~2023.03.	49	47	(유)대호건설
성당면 와초리 164-2번지외 1개소 하수관로 정비공사	하수관로 정비	2022.11.~2023.01.	33	33	(유)우석건설
모현동 456-18번지 일원 하수관로 정비공사	하수관로 정비	2022.11.~2023.01.	30	27	(유)청우건설
2022년 동절기 맨홀보수 공사 단가계약(1차)	하수맨홀 정비	2022.12.~2023.05.	49	0	㈜영웅건설
익산 국가산업단지 노후 하수관로 정비사업	노후하수관로 정비	2022.12.~2024.12.	1,214	22	세움종합건설(주)

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

17. 국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	예 산 액				집 행 액				비고
		계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
	계	31,112	22,137.5	2,468	6,506.5	16,154	13,823	1,161	1,170
1	남부2ㆍ3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업	7,984	5,573	239	2,172	4,856	4,848	0	8
2	남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업	6,374	4,655	465	1,254	2,739	2,739	0	0
3	북부1처리분구 하수관로 정비사업	2,019	1,411	60	548	14	13	0	1
4	흥왕 소규모하수 처리시설 신설	429	300	0	129	238	238	0	0
5	익산시 금마 하수 처리시설 증설	157	129	28	0	0	0	0	0
6	익산공공하수처리시설 하수찌꺼기감량화사업	8,466	5,926	1,270	1,270	7,742	5,420	1,161	1,161	종합 시운전중
7	환경기초시설 악취개선사업	667	500	167	0	220	220	0	0	실시 설계중
8	익산공공하수 탄소중립프로그램 태양광설치	1,709	854.5	0	854.5	0	0	0	0	실시 설계중
9	익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	1,145	1,041	104	0	0	0	0	0	행정절차이행
10	익산시 노후하수관로 정밀조사용역	397	397	0	0	0	0	0	0	준공 미도래
11	익산 국가산업단지 노후하수관로 정비사업	1,215	851	85	279	22	22	0	0	준공 미도래
12	익산 영등지구 노후 하수관로 정비사업	550	500	50	0	323	323	0	0	행정절차이행

18. 지방보조금 성과평가 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

19. 2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 이월사업 개요	12건 / 4,154백만원

▸명 시 이 월         :  10건 / 3,199백만원

▸사 고 이 월         :   2건 /   955백만원

□ 명시이월사업

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
계	10건	3,199	722	2,477	22.6%
송학동 우수박스 정비사업	우수박스(2.0×1.5) L=284m	1,000	28	972	3%	건설개량이월
금마면 용순길 22-6 주변 하수관로 정비공사	우수관로(D600mm L=150m, D300 L=106m), 맨홀 9개소	100	0	100	0%	건설개량이월
관내 분류식 배수설비 설치공사	아스팔트 포장절단 외 56개 공정	120	116	4	97%	건설개량이월
유천생태습지 주차장 설계용역	설계용역 1식	80	32	48	40%	집행잔액
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계)	하수관로 정밀조사 L=110km	162	104	58	64%	사고이월
익산시 노후하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=1.3km	443	151	292	34%	집행잔액
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	하수관로 정비 L=2.63km	1,000	0	1,000	0%	사고이월
우수관로, 맨홀 악취저감 뚜껑정비공사	맨홀 뚜껑 정비	39	38	1	97%	건설개량이월
하수도 기계준설	하수도 기계준설	73	73	0	100%	건설개량이월
읍면동 하수도시설 정비공사	하수관로 정비	182	180	2	99%	건설개량이월

□ 사고이월사업

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	이월액	집행액	잔액	집행률	비고
계	2건	955	928	27	97.1%
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 실시설계용역	하수관로정비 L=2.63km	65	38	27	59%	집행잔액
국가산업단지 노후 하수관로 정비사업	하수관로 정비 L=13.4km	890	890	0	100%

20. 2023년 명시이월 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	지출액	이월액	이월사유	비고
11개 사업	16,027	8,321	7,706
남부2,3/북부2처리분구 하수관로 정비사업	10,689	6,872	3,817	낙찰차액 및 집행 잔액
화평마을 오수관로 설치공사	500	66	434	준공시기 미도래
함열읍 와리 우수박스 설치공사 설계비	45	0	45	준공시기 미도래
송학동 배수설비 설치공사	272	58	214	준공시기 미도래
관내 분류식 배수설비 설치공사	900	488	412	준공시기 미도래
익산공공하수 탄소중립 프로그램 태양광설치	1,709	0	1,709	실시설계중 설치위치 및 용량 관련 전북도, 환경청 등 협의시일 소요
익산시노후하수관로 정밀조사용역(3단계)	397	0	397	준공시기 미도래
지하시설물 지반탐사	130	57	73	준공시기 미도래
읍면동 주민편익사업	335	0	335	준공시기 미도래
하수관로 기계준설공사	1,000	737	263	준공시기 미도래
송학동 880번지 일원 하수관로 정비공사	50	43	7	준공시기 미도래

21. 2023년 명시이월(의회제출) 후 2022년도에 집행한 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

해  당  없  음

22. 예산 이용, 전용 사항 및 예비비 건별 집행 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□

해  당  없  음

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

해  당  없  음

24. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액  반납한 예산현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

해  당  없  음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 2022년도 반납건

(단위 : 백만원)

연번	사업명	예산액	집행액	반납액	반납 사유	비고
1	2021년 익산시 주민참여 예산 도비보조금	21	20	1	집행잔액

□ 2023년도 반납 예정건

(단위 : 백만원)

연번	사업명	예산액	집행액	반납액	반납 사유	비고
	4개 사업	31,175	28,333	2,842
1	남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업	25,072	22,402	2,670	사업완료에 따른 국·도비 정산
2	익산시 노후하수관로 정비사업	1,941	1,771	170	사업완료에 따른 국·도비 정산
3	익산시 하수관로 정비 임대형 민자사업(09BTL)	3,987	3,986	1	2021년 국비보조금 시설임대료 정산
4	익산시 하수관로 정비 임대형 민자사업(06BTL)	175	174	1	2021년 도비보조금 시설임대료 정산

26. 2022년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

해  당  없  음

27. 2022년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

해  당  없  음

28. 2022년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

해  당  없  음

29. 2022년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	예산액	사업비	집행액	공정률	미 집 행 사 유 및 금후계획
계	7건	4,034	14,985	0
함열읍 와리 우수박스 설치공사 설계비	실시설계 1식 (1.5m×1.5m 우수박스 설치 L=430m)	45	43	0	0%	준공시기 미도래 및 ’23.6월 준공예정
익산시 노후하수관로 정밀조사용역(3단계)	정밀조사 L=80km	397	397	0	0%	준공시기 미도래 및 ’23.6월 준공예정
읍면동주민편익사업	하수도정비 7개소	335	335	0	0%	준공시기 미도래 및 ’23.3월 준공예정
익산공공하수 탄소중림프로그램 태양광설치	태양광 발전설비 설치 (용량 743㎾, 익산공공하수처리장 유휴부지 내)	1,709	1,709	0	설계90%	설치위치 및 용량 관련 전북도, 환경청 협의 완료 (’23.3.)로 금년내 완료 계획(’23.8.)
금마면 용순길 22-6 주변 하수관로 설치공사	우수관로(D600L=150m D300L=106m) 맨홀 9개소	100	89	0	0%	민원으로 인한 공사중지로 민원협의 완료 후 추진 및 준공예정
익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)	노후하수관로 정비 L=2.63km	1,145	1,145	0	실시설계 추진중	행정절차이행 (신기술, 특허공법선정, 재원협의 등)
익산시 금마 공공하수 처리시설 증설	하수처리시설 증설 Q=1,100㎥➪1,600㎥	157	157	0	실시설계 추진중	사업추진 방식 변경에 따른 준공시기 지연으로 ’24.12월 준공예정

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□

해  당  없  음

31. 소송 사건 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황
		원 고 (항소인)	피 고 (피항소인)	일자	관할법원
구상금 청구 (서울남부지방법원2021가소 580755)	주차 중 도로 집중호우로 차량침수에 따른 구상금 청구	한화손해보험주식회사	익산시	2020. 10.05.	서울남부 지방법원	2023.01.13. 소송종결 -원고일부승 -영조물배상공제 보험사고 자기부담금 지급 (500천원)
구상금 청구 (서울중앙지방법원2021가소 2216825)	주차 중 도로 배수로 막힘으로 차량침수에 따른 구상금 청구	삼성화재해상보험주식회사	익산시	2021. 11.02.	서울중앙 지방법원	2022.08.30. 원고패 소송종결
구상금 청구 (서울중앙지방법원2021가소 2234854)	주차장 진입 중 맨홀뚜껑 이탈로 인한 차량파손에 따른 구상금 청구	디비손해보험주식회사	익산시	2021. 11.07.	서울중앙 지방법원	2022.07.11. 소송종결 -원고일부승 -영조물배상공제보험 사고 자기부담금 지급(500천원)
구상금 청구 (서울중앙지방법원2021가소 2409986)	주차 중 도로 배수로 막힘으로 차량침수에 따른 구상금 청구	삼성화재해상보험주식회사	익산시	2021. 12.14.	서울중앙 지방법원	2022.12.30. 소송종결 -원고일부승 -영조물배상공제보험 사고 자기부담금 지급(500천원)
임료 (전주지방법원 군사지원 2022가단1126)	사유지내 하수관로 매설에 대한 임료 청구	권오철	익산시	2022. 04.14.	전주지방법원군산지원	2023.02.28. 소송종결 -원고일부승 -판결금 지급 (4,000천원)
손해배상 (전주지방법원 익산시법원 2022가소1453)	창인동 침수 피해에 대한 손해배상 청구	정순자	익산시	2022. 05.12.	전주지방법원 익산시법원	2023.03.03. 소송종결 -침수피해손해 사정금액만지급
구상금 청구 (서울중앙지방법원2022가소 1796684)	주행 중 도로 배수로 막힘으로 차량침수에 따른 구상금 청구	하나손해보험주식회사	익산시	2022. 07.11.	서울중앙 지방법원	2023.03.01. 소송종결 - 원고일부승 - 판결금 지급 (3,000천원)
부당이득금 반환 (전주지방법원 군산지원2022 가합51135)	하수도사용료 부과처분에대한 부당이득금반환 청구	신일섬유 주식회사 외 3명	익산시	2022. 11.15.	전주지방법원군산지원	2023.01.09. 답변서 제출
구상금 청구 (서울중앙지방법원2022가소 2454068)	주차 중 도로 배수로 막힘으로 차량침수에 따른 구상금 청구	주식회사 케이비손해보험	익산시	2022. 12.22.	서울중앙 지방법원	2023.02.02. 답변서 제출

32. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비고
	일 자	성 명	내 용
1	2022.02.21.	변**	▪개인 사유지 맨홀뚜껑 파손	▪개인소유 시설물은 익산시에서 관리 책임 없음 (2022.03.02.)
2	2022.04.23.	김**	▪유천생태습지 내 나무 쓰레기 처리요청	▪나무 쓰레기 제거 완료 (2022 . 05. 02.)
3	2022.05.11.	박**	▪오폐수 무단방류로 인한 악취민원	▪생활하수를 배출하고있는 병원에게 시정공문 발송 후 배수로 정비 완료 (2022.05.17.)
4	2022.05.20.	손**	▪민원인 건물에 대한 정화조 폐쇄 및 배수설비 공사 요청	▪정화조 폐쇄 및 배수설비 설치는 개인이 부담하여 처리하여야 함을 안내 (2022.06.01.)
5	2022.05.27.	황**	▪유천생태습지 고사목 방치 문제	▪유천생태습지 내 고사목 정리 완료(2022.06.01.)
6	2022.05.29.	이**	▪사유지 내 오수관 철거 후 파손된 도로에 대한 원상복구 요청	▪해당 시공사에게 통보 후 원상복구 완료 (2022.06.03.)
7	2022.05.30.	김**	▪정화조 폐쇄 및 배수설비 공사 요청	▪정화조 폐쇄 및 배수설비 설치는 개인이 부담하여 처리하여야 함을 안내 (2022.06.08.)
8	2022.05.31.	김**	▪미등록 지하수 단속요청	▪지하수법에 따라 신고 등 절차 이행 후 사용하도록 안내 (2022.06.09.)
9	2022.07.09.	안**	▪유천생태습지 소공연장 행사 불만	▪소공연장 대관 신청인에게 이용객 불편을 야기할 수 있는 사항 자제하도록 안내 (2022.07.13.)
10	2022.08.08.	김**	▪집수정 준설 요청	▪집수정 준설 완료 (2022.08.18.)
11	2022.08.19.	오**	▪집수정 준설 요청	▪집수정 준설 완료 (2022.08.25.)
12	2022.08.24.	김**	▪맨홀 주변 싱크홀	▪CCTV 확인 후 보수 완료 (2022.08.30.)
13	2022.09.26.	김**	▪골목길 오폐수 공사 후 없어진 계단 난간 복구설치 요청	▪계단 난간 복구 완료 (2022.10.31.)
14	2022.09.26.	이**	▪도로 침하	▪보수완료 (2022.10.05.)
15	2022.09.29.	김**	▪공사 후 포장 관련	▪특화거리 보도 블록 제작에 어려움이 있어 복구공사 지연되었으며 포장공사 완료(2022.10.11.)
16	2022.10.20.	김**	▪골목길 오폐수 공사 후 없어진 계단 난간 복구설치 재요청	▪계단 난간 복구 완료 (2022.10.31.)
17	2022.11.21.	박**	▪무단방류되는 음식점 오수 단속요청	▪현지 출장 후 관련 법령(하수도법 제80조(과태료)제4항제5호 배수설비를 설치하지 아니하고 하수를 유출시킨 자) 안내 (2022.11.30.)
18	2022.11.22.	이**	▪사유지 내 관로 설치에 대한 확인 요청	▪남부 2,3 북부2처리분구 하수관로 정비사업 확인 결과 시에서 공사하지 않았음을 안내 (2022.11.30.)
19	2022.12.02.	김**	▪맨홀 단차 정비 요청	▪맨홀 단차 정비 완료 (2022.12.12.)

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□

□ 민간위탁현황

시설명	수탁기관	위‧수탁금액	동의 관련			비고
			의회동의 여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
익산 공공하폐수처리시설	환경시설관리(주), (유)대신환경개발	3,021 백만원 /년	여 (익산시 사무의 민간 위탁 촉진 및 관리조례 제4조의 4)	2019. 09. 01. ~ 2022. 12. 31.	2020. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.

□ 민간위탁 지도점검 현황

시설명	수탁기관	점검근거	점검일자	점검내용	지적사항	조치결과 (수탁기관)	비고
익산 공공 하폐수 처리 시설	환경시설 관리(주), (유)대신 환경개발	익산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 시행규칙 제14조	매월 10일	▸예산관리, 협약준수여부, 안전관리에관한 사항 ▸시설관리실태, 방류수질 등 위탁시설·사무의 전반에관한 사항 등	▸하수처리장운영실적 보고시정기검사 관련서류 미흡 ▸시설관리 미흡 등	▸운영실적 보고시각종 검사 이행 결과제출 (전기,소방,승강기,악취측정,실험실 측정기기 등) ▸시설정비 (쓰레기 제거, 역세수조덮개도색,하수처리장부지 예초 실시 등)

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

36. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□
작성자	:	하수시설계장		최윤호	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□
작성자	:	생활하수계장		박연규	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

해  당  없  음

감사자료 과 요구사항

1. 하수도사업 공기업 운영사항

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□

□ 현      황

◦ 자    산 : 금425,586백만원(자본 333,199  부채 92,387)

◦ 부채비율 : 27.72%(부채총계 / 자기자본 × 100)

⃞ 추 진 실 적

◦ 하수도사용료 부과·징수 : 부과액 20,712백만원, 징수액 20,556백만원(99.2%)

◦ 연도별 하수도사용료 현실화율 현황

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사용료수익 (백만원)	25,289	22,743	21,228	20,553	20,712
㎥당 원가(원)	1,941.63	1,980.49	2,086.94	2,368.15	2,876.48
㎥당 요금(원)	695.78	737.22	680.38	743.16	877.97
현실화율(%)	35.83	37.22	32.60	31.38	30.52

◦ 원인자부담금 부과·징수 : 부과액 2,125백만원, 징수액 2,125백만원 (100%)

◦ 여유자금 효율적 관리 : 예금액 23,392백만원 (이자수입 108백만원)

□ 문  제  점

◦ 사용료수익 감소 추세 및 현실화율 감소

□ 향 후 계 획

◦ 생활물가 안정화 후 현실화율 개선 방안 추진 및 여유자금 효율적 관리

2. 하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수행정계장		이경순	□

□ 부과징수 현황(2022년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액 (A)	부과액 (B)	징수액 (C)	체납액 (D)	부과율 (B/A)	징수율 (C/B)
계	20,461	20,712	20,556	156	101.2	99.2
가정용	11,028	10,738	10,699	39	97.4	99.6
일반용	8,862	9,368	9,275	93	105.7	99.0
대중탕용	261	227	218	9	87.0	96.0
산업용	310	379	364	15	122.3	96.0

□ 연도별 체납액 현황

(단위 : 백만원)

년 도 금 액	합계	2022	과년도
			계	2021	2020	2019	2018 이전
계	615	156	459	34	98	126	201
가정용	52	39	13	0	5	5	3
일반용	288	93	195	33	29	33	100
대중탕용	39	9	30	1	4	7	18
산업용	236	15	221	0	60	81	80

□ 상수도에 따른 하수도 요금 현황

◦ 상수도에 따른 하수도 요금 부과징수 현황(2022년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	부과액 (A)	징수액 (B)	체납액 (C)	징수율 (B/A)
계	19,975	19,876	99	99.5
가정용	10,717	10,678	39	99.6
일반용	8,769	8,729	40	99.5
대중탕용	156	151	5	96.8
산업용	333	318	15	95.5

◦ 상수도에 따른 하수도 요금 체납액 현황

(단위 : 백만원)

년 도 금 액	합계	2022	과년도
			계	2021	2020	2019	2018 이전
계	423	101	322	10	81	98	133
가정용	52	39	13	0	5	5	3
일반용	129	40	89	10	16	13	50
대중탕용	7	7	0	0	0	0	0
산업용	235	15	220	0	60	80	80

□ 지하수에 따른 하수도 요금 현황

◦ 지하수에 따른 하수도 요금 부과징수 현황(2022년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	부과액 (A)	징수액 (B)	체납액 (C)	징수율 (B/A)
계	737	680	57	92.3
가정용	21	21	0	100.0
일반용	599	546	53	91.2
대중탕용	71	67	4	94.4
산업용	46	46	0	100.0

◦ 지하수에 따른 하수도 요금 체납액 현황

(단위 : 백만원)

년 도 금 액	합계	2022	과년도
			계	2021	2020	2019	2018 이전
계	194	57	137	24	17	28	68
가정용	0	0	0	0	0	0	0
일반용	159	53	106	23	13	20	50
대중탕용	34	4	30	1	4	7	18
산업용	1	0	1	0	0	1	0

□ 고액체납자(30만원 이상)행정조치 현황(지하수)

구분	체납액		행정조치				비고
			압류예고(독촉)중		압류
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	24	172	8	13	16	159
일반용	15	140	6	9	9	131
대중탕용	8	31	2	4	6	27
산업용	1	1	-	-	1	1

(단위 : 건, 백만원)

□ 추 진 실 적

◦ 징수대책반 편성 운영(2개조 7명)

▸체납자 유형별 분석(단순체납, 고질체납, 부도, 무재산 등)

▸전화·방문 체납 독려(징수) : 751건

- 소액(10만원 미만) : 전화 및 SMS(문자 메시지) 등 활용

- 고액(10만원 이상) : 체납자를 직접 방문하여 납부 독촉

□ 문  제  점

◦ 지하수 사용자의 경우 체납 시 단수 조치 불가

□ 향 후 계 획

◦ 고질체납자 징수 관리

▸대  상 : 30만원 이상 또는 5회 이상 체납자

▸관  리 : 체납액 납부 독촉(3회) 후 불이행 시 재산 압류 등 행정처분하고, 무재산 및 행방불명자는 결손처분 검토

3. 하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 채무상환 계획(시비 부담분)

(단위: 백만원)

사 업 명	임대료	상환액	상 환 계 획
			계	2022	2023	2024	2025이후
계	62,474	25,940	36,534	3,038	3,038	3,038	27,420
‘06 하수관거정비 BTL민간투자사업	29,422	14,893	14,529	1,425	1,425	1,425	10,254
‘09 하수관거정비 BTL민간투자사업	33,052	11,047	22,005	1,613	1,613	1,613	17,166

□ 채무 상환조건

재 원 별	용 도	상환조건	이율	상환기간	채권기관
‘06 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2011 ~2031	(주)푸른익산환경
‘09 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2014 ~2034	(주)청정익산

4. 하수찌꺼기 감량화사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내 (익산시 하나로 68 일원)

◦ 규    모

▸ 기존 소화조 개선(10,000㎥/일) 및 신설(6,692㎥/일)

▸ 가스저장설비, 가스정제설비, 기계식 농축기, 탈취설비 등 신설

◦ 사업기간 : 2018년 ~  2023년

◦ 사 업 비 : 26,844백만원(국비 18,791 도비 4,027 시비 4,026)

□ 추 진 실 적

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 타당성 조사 용역 완료	: 2017. 02.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약	: 2017. 12.

◦ 설계 경제성(VE) 검토용역 완료	: 2018. 10.

◦ 설계의 기술자문, 재원협의, 설치변경인가 등 행정절차 이행 : 2018. 12. ~ 2019. 08.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019. 06.

◦ 시설, 전기계측, 소방공사, 건설사업관리 용역 착공	: 2019. 08.

◦ 정보통신공사 착공	: 2021. 12.

◦ 사업준공	: 2022. 11.

□ 향 후 계 획

◦ 종합시운전 용역 착수	: 2023. 02.

◦ 종합시운전 용역 완료 및 시설운영                      : 2023. 08.

5. 남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수시설계장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남부2처리분구 (동산동 ․인화동․평화동 일부)

남부3처리분구 ( 금강동 ․신흥동 ․용제동  일부)

북부2처리분구 (영등1동 ․영등2동 ․신용동 일부)

◦ 규    모 : 오수관로 30.5km, 배수설비 2,616가구

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 35,120백만원(국비 24,043 도비 1,029 시비 10,048)

▸ 2022년 사업비 : 7,984백만원(국비 5,573 도비 239 시비 2,172)

□ 추 진 실 적

◦ 사업 선정	: 2016. 12. 23.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2017. 06. 19.

◦ 행정절차 이행 (재원협의, 기술심의, 원가검토)	: 2018. 04. ~ 12.

◦ 시설공사 시행 (1~4차분) 완료	: 2019. 05. ~ 2022. 09

※ 공정율 100%

□ 문 제 점

◦ 행정절차 이행(전북지방환경청 사업비 정산) 기일 소요

6. 남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 규    모 : 오수관로 15.3km, 배수설비 1,290가구

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 37,386백만원(국비 13,559 도비 2,382 시비 21,445)

▸ 2022년 사업비 : 6,374백만원(국비 4,655 도비 465 시비 1,254)

□ 추 진 실 적

◦ 2019 국고보조사업 확정	: 2018. 12.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2019. 07.

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2021. 03.

◦ 시설공사 착공(1차분)	: 2021. 09.

◦ 시설공사 시행(1차분)	완료	: 2022. 11.

◦ 시설공사 시행(2차분)	시행	: 2022. 07. ~ 2023. 08.

□ 문 제 점

◦ 총사업비 증가에 따른 시비 분담금 추가경정예산 확보 필요

□ 향 후 계 획

◦ 시설공사 3차분 착공	: 2023. 03.

◦ 시설공사 2차분 준공	: 2023. 07.

7. 북부1처리분구 하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 규    모 : 오수관로 L=28.4km, 배수설비 1,363가구

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 44,242백만원(국비 34,851 도비 1,939 시비 17,452)

▸ 2022년 사업비 : 2,019백만원(국비 1,411 도비 60 시비 548)

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2020. 06.

◦ 설계경제성(VE) 검토 용역 완료	: 2021. 08.

◦ 설계 안정성검토 용역 완료	: 2021. 10.

◦ 비굴착 보수공법 선정	: 2021. 10.

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2022. 06.

▸총사업비 증액 : 41,607백만원 ⇒ 44,242백만원

◦ 시설공사 조달 발주(1차분)	: 2022. 11.

□ 문 제 점

◦ 본격적인 공사 추진에 따른 시비 분담금 추가경정예산 확보 필요

□ 향 후 계 획

◦ 시설공사 (1차분) 착공	: 2023. 04.

◦ 시설공사 (2차분) 추진	: 2023. 07.

8. 금마공공하수처리시설 증설

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마하수처리구역(금마면 동고도리 일원)

◦ 규    모 : 하수처리시설 효율증대를 위한 하수 처리구역 조정

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 4,418백만원(국비 3,092 도비 663 시비 663)

▸ 2022년 사업비 : 157백만원(국비 129 도비 28 시비 - )

□ 추 진 실 적

◦ 전라북도 원가심사	: 2021. 07.

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2021. 10.

◦ 기본 및 실시설계 지방환경청 협의	: 2022. 04.

▸ 익산시 하수도정비 기본계획에 의한 금마처리구역 정비 및 연계처리 방안

□ 문 제 점

◦ 익산시 하수도 정비 기본계획에 익산 북부하수처리구역 확대 편입 및 금마처리

구역 일부 조정편입에 따른 사업추진방식 변경 협의로 사업 지연

□ 향 후 계 획

◦ 기본 및 실시설계 용역 마무리	: 2023. 03. ~ 06

◦ 시설공사 발주 전 행정절차	: 2023. 07. ~ 11

◦ 시설공사 발주	: 2023. 11.

◦ 시설공사 준공	: 2025. 12.

9. 환경기초시설 악취개선 사업

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 총8개소(익산·분뇨·북부·함열·금마·여산하수, 1·2중계펌프장)

◦ 규    모 : 악취방지시설 신규 설치 및 용량 재구성 등

◦ 사업기간 : 2022년 ~  2024년

◦ 사 업 비 : 7,995백만원(국비 4,320 도비 1,838 시비 1,837)

▸ 2022년 사업비 : 667백만원(국비 500 도비 167)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 악취기술진단 실시	: 2020.02~12.

◦ 환경부 국고보조사업 확정	: 2021. 12.

◦ 실시설계 용역 조달청 발주 의뢰                           : 2022. 03.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 06.

□ 문 제 점

◦ 재원 부족으로 국비 대비 시비 매칭이 어려움

□ 향 후 계 획

◦ 재원협의 신청                                            : 2023. 02.

▸ 총사업비 변경(10,927백만원) 및 재원협의 요청(전북환경청,‘23.2.15.)

◦ 재원협의 완료 및 실시설계 용역 준공                      : 2023. 04.

◦ 설계심의	: 2023. 05.

◦ 시설공사 발주                                            : 2023. 06.

10. 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 규    모 : 노후우수박스 정비 L=2.6km

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 17,350백만원(국비 8,354 도비 835 시비 8,161)

▸ 2022년 사업비 : 1,145백만원(국비 1,041 도비 104 시비 -)

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 03.

◦ 2022년 국고보조 신규 사업 신청(환경부)	: 2020. 02.

◦ 실시설계용역비 추경 확보(220백만원)	: 2020. 07.

◦ 2022년 국고보조 신규 사업 확정	: 2020. 09.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

□ 향 후 계 획

◦ 환경부 재원협의 완료	: 2023. 04.

◦ 원가심사 및 공사 발주	: 2023. 04.

◦ 공사 착공	: 2023. 05.

11. 국가산업단지 노후하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 규    모 : 노후 우·오수관로 정비 L=13.4km

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 13,555백만원(국비 6,395 도비 640 시비 6,520)

▸ 2022년 사업비 : 1,214백만원(국비 851 도비 85 시비 278)

□ 추 진 실 적

◦ 국고보조금 예산 신청(환경부)	: 2019. 02.

◦ 국가산업단지 노후하수관로 기술진단 시행	: 2019. 10.

◦ 실시설계용역 착수	: 2019. 10.

◦ 국고보조사업 확정	: 2019. 12.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2022. 10.

◦ 공사 착공	: 2022. 12.

□ 문 제 점

◦ 재원 부족으로 국비 대비 시비 매칭이 어려움

□ 향 후 계 획

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

12. 공공 하수처리시설 운영관리(BTO)

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□

□ 시설운영현황

◦ 공공하수처리시설(BTO 사업)

▸ 운 영 사 : ㈜전북엔비텍

▸ 운영기간 : 2008년 ~ 2028년

▸ 운 영 비 : 15,860백만원(2022년)

시 설 명	익산	익산북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량(㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
처리량(천㎥/년)	29,246	8,782	1,649	332	28

□ 추 진 실 적

◦ 하수처리장(4개소) 수질검사 실시(유입수 및 방류수 BOD 등 6개 항목)

▸ 매월 시료 채취 전라북도 보건환경연구원 수질분석 실시 : 12회

◦ 통합관리시스템을 활용한 적정수질 유지 및 시설물 상시 모니터링

◦ 해빙기 및 우기시 하수관로, 차집맨홀 및 시설물 수시 점검 실시

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 기준 준수(부지경계, 탈취기 배출구)

◦ 매년 안전관리계획 수립 후 안전보건교육 및 비상대비 훈련 실시

◦ 함열하수 공기압축기 보수 외 26건 보수 및 개선 실시      : 2022. 01. ~ 12.

□ 향 후 계 획

◦ 통합관리시스템을 활용하여 수질관리 및 시설물 유지관리로 법정수질기준 준수

◦ 공공하수처리시설 시설물 관리, 안전점검 등 지속적인 운영관리 점검 실시

13. 영등지구 노후하수관로 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동, 마동, 남중동 일원

◦ 규    모 : 노후 우·오수관로 정비 L=7.2km

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 6,306백만원(국비 3,153 도비 315 시비 2,838)

▸ 2022년 사업비 : 550백만원(국비 500 도비 50)

□ 추 진 실 적

◦ 국고보조금 예산 신청(환경부)	: 2021. 02.

◦ 국고보조사업 확정	: 2021. 10

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 05.

□ 향 후 계 획

◦ 신기술, 특허 공법선정                                      : 2023. 04.

◦ 환경부 재원협의	: 2023. 05.

◦ 공사발주 및 착공	: 2023. 06.

14. 송학동 우수박스 정비사업

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		최 윤 호	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-7번지 일원

◦ 규    모 : 2.0m×1.5m 우수박스 설치(L=380m)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(특교세 1,000)

□ 추 진 실 적

◦ 전라북도 원가심사	: 2021. 07.

◦ 2021년 하반기 특별교부세 사업 신청	: 2021. 09.

◦ 2021년 특별교부세 사업 확정	: 2021. 12.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 01.

◦ 실시설계용역 준공	: 2022. 08.

◦ 특별교부세 용도변경(위치 및 사업기간) 신청	: 2022. 10.

◦ 공사 발주	: 2022. 12.

□ 문 제 점

◦ 도로굴착 시 지하매설물(도시가스 등) 협의 등 기일 소요로 사업 지연 우려

□ 향 후 계 획

◦ 공사 착공	: 2023. 05.

◦ 공사 완료	: 2023. 12.

15. 공공하‧폐수처리시설 관리대행

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수운영계장		김용환	□

□ 시설운영현황

◦ 공공하 ‧ 폐수처리시설(민간위탁 관리대행)

▸ 운 영 사 : 환경시설관리(주), (유)대신환경개발

▸ 위탁기간 : 2020년 ~ 2022년

▸ 운 영 비 : 3,021백만원(2022년)

시 설 명	하수처리시설			폐수처리시설
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량(㎥/일)	600	1,760	85개소	5,500	5,000	4개소

□ 추 진 실 적

◦ 하·폐수처리장(25개소) 방류수 정기 수질검사 실시

수질검사주기	일 1회	주 1회	월 1회
검사대상	500톤/일 이상	50~500톤/일	50톤/일 미만
개소수	3개소	12개소	10개소

◦ 통합관리시스템을 활용한 적정수질 유지 및 시설물 상시 모니터링

◦ 해빙기 및 우기시 시설물 수시 점검 및 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사

◦ 매년 안전관리계획 수립 후 안전보건교육 및 비상대비 훈련 실시

◦ 삼기간촌 외 4개 하수처리장 기술진단 완료      : 2022. 08.

□ 향 후 계 획

◦ 민간위탁 관리대행 시행	: 2023. 01. ~ 2025. 08.

▸ 운 영 사 : 환경시설관리(주), (유)일토씨엔엠

◦ 공공하·폐수처리시설 관리대행업체 관리·감독 철저

16. 소규모 하수도 시설 정비 공사

확인자	:	하수도과장		황 병 선	□
작성자	:	하수관리계장		이우진	□

□ 사업개요 및 추진사항

(단위 : 백만원, %)

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비	도급자	공정률
	계 : 62건			1,902
1	2022년 상반기 맨홀 보수공사 단가계약(1차)	맨홀보수	2022. 01. ~ 2022. 06	47	(주)성운건설	100%
2	2022년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 01. ~ 2022. 05	47	(주)성민건설	100%
3	2022년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비	2022. 02. ~ 2022. 06	47	남성환경	100%
4	2022년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도정비	2022. 01. ~ 2022. 05	21	(유)세진건설	100%
5	2022년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(4차)	하수도정비	2022. 01. ~ 2022. 03	21	(유)대호건설	100%
6	2022년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(5차)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 08	21	(유)정진건설	100%
7	2022년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도기계준설	2022. 01. ~ 2022. 05	47	(유)엠제이이엔씨	100%
8	2022년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도기계준설	2022. 01. ~ 2022. 05	47	(유)대길환경	100%
9	2022년 상반기 하수도기계준설공사 단가계약(3차)	하수도기계준설	2022. 01. ~ 2022. 05	47	(주)삼일공사	100%
10	2022년 웅포면 상제마을 배수로 정비공사	하수도정비	2022. 03. ~ 2022. 05	18	(유)주신테크	100%
11	2022년 부송동 부평마을 배수로 정비공사	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 06	21	(유)지수건설	100%
12	2022년 도민제안사업 망성면 하수관로 정비공사 (교향마을 외 2개마을)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 06	43	(주)부경건설	100%
13	2022년 도민제안사업 하수관로 정비사업 (낭산면 소도마을)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 06	9	(유)도암건설	100%
14	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 08	21	(유)성진건설	100%
15	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 08	21	(유)베스트이엔씨	100%
16	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 08	48	(유)아태건설	100%
17	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(4차)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 08	21	(유)익산환경건설	100%
18	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(5차)	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 08	20	(유)동화개발	100%
19	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(6차)	하수도정비	2022. 05. ~ 2022. 08	47	(유)대명건설	100%
20	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(7차)	하수도정비	2022. 05. ~ 2022. 09	21	(유)엠제이이엔씨	100%
21	2022년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(8차)	하수도정비	2022. 06. ~ 2022. 10	21	(유)보건	100%
22	2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도기계준설	2022. 05. ~ 2022. 08	47	(유)광우건설	100%
23	2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도기계준설	2022. 04. ~ 2022. 08	21	(주)신성토건	100%
24	2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(3차)	하수도기계준설	2022. 05. ~ 2022. 08	47	(유)대길환경	100%
25	2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(4차)	하수도기계준설	2022. 05. ~ 2022. 08	47	(유)광우건설	100%
26	2022년 2분기 하수도기계준설공사 단가계약(5차)	하수도기계준설	2022. 05. ~ 2022. 09	21	(유)광우건설	100%
27	평화동 248-1번지 인근 하수관로 정비공사	하수도정비	2022. 04. ~ 2022. 07	16	(유)송광토건	100%
28	용안면 성동마을 배수로 복개 공사	하수도정비	2022. 05. ~ 2022. 07	21	(주)성운건설	100%
29	2022년 주민참여예산 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 03. ~ 2022. 07	47	(유)주신테크	100%
30	2022년 읍면동 민원 처리공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 06. ~ 2022. 10	21	(유)흙손건설	100%
31	2022년 읍면동 민원 처리공사 단가계약(2차)	하수도정비	2022. 06. ~ 2022. 10	21	(주)영광건설	100%
32	2022년 읍면동 민원 처리공사 단가계약(3차)	하수도정비	2022. 06. ~ 2022. 10	21	(주)빛엔지니어링	100%
33	2022년 읍면동 민원 처리공사 단가계약(4차)	하수도정비	2022. 06. ~ 2022. 10	21	(유)이레건설	100%
34	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도기계준설	2022. 07. ~ 2022. 11	47	(유)대길환경	100%
35	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도기계준설	2022. 07. ~ 2022. 10	47	(유)신안건설	100%
36	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(3차)	하수도기계준설	2022. 07. ~ 2022. 11	21	(주)송민건설	100%
37	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(4차)	하수도기계준설	2022. 07. ~ 2022. 10	21	(유)남일건설	100%
38	2022년 우기철 하수도기계준설공사 단가계약(5차)	하수도기계준설	2022. 09. ~ 2023. 01	21	(유)보건	100%
39	2022년 하반기 맨홀 보수공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 07. ~ 2022. 12	47	(유)태우건설	100%
40	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 07. ~ 2022. 11	21	(주)내담건설	100%
41	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비	2022. 08. ~ 2022. 12	43	(주)성원건설	100%
42	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도정비	2022. 08. ~ 2022. 12	48	(주)성운건설	100%
43	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(4차)	하수도정비	2022. 09. ~ 2023. 01	21	(유)지수건설	100%
44	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(5차)	하수도정비	2022. 09. ~ 2022. 12	21	(유)청우건설	100%
45	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(6차)	하수도정비	2022. 09. ~ 2023. 01	21	(주)삼일공사	100%
46	2022년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(7차)	하수도정비	2022. 10. ~ 2023. 02	21	남성환경	100%
47	2022년 3분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도기계준설	2022. 09. ~ 2023. 01	47	(유)이레건설	100%
48	2022년 3분기 하수도기계준설공사 단가계약(2차)	하수도기계준설	2022. 09. ~ 2023. 01	47	(유)엠제이이엔씨	80%
49	남중동 323-15번지 일원 하수관로 정비공사	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 03	11	(유)태강건설	100%
50	2022년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(2차)	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 02	47	(유)성지토건	100%
51	2022년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(3차)	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 03	21	(유)한국티엠에스	100%
52	2022년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(4차)	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 03	21	(유)원광수도사	25%
53	2022년 4분기 하수도 민원 처리공사 단가계약(5차)	하수도정비	2022. 12. ~ 2023. 04	22	(유)대호건설	25%
54	2022년 4분기 하수도기계준설공사 단가계약(1차)	하수도기계준설	2022. 11. ~ 2023. 03	47	(유)엠제이이엔씨	25%
55	2022년 4분기 하수도기계 준설공사 단가계약(2차)	하수도기계준설	2022. 11. ~ 2023. 03	47	(유)대호건설	20%
56	2022년 4분기 하수도기계준설공사 단가계약(3차)	하수도기계준설	2022. 11. ~ 2023. 03	21	(유)우승건설	50%
57	삼기면 용연리 1349-4번지 하수관로 정비공사	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 01	25	(유)태우건설	100%
58	성당면 와초리 164-2번지외 1개소 하수관로 정비공사	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 01	32	(유)우석건설	50%
59	송학동 880번지 일원 하수관로 정비공사	준설토 113㎥	2022. 11. ~ 2023. 01	19	(유)엠제이이엔씨	100%
60	모현동 456-18번지일원 하수관로 정비공사	하수도정비	2022. 11. ~ 2023. 01	26	(유)청우건설	100%
61	영등동 비젼교회 앞 하수관로 이설공사	하수도정비	2022. 12. ~ 2023. 01	13	(유)송광토건	100%
62	2022년 동절기 맨홀 보수공사 단가계약(1차)	하수도정비	2022. 12. ~ 2023. 05	49	(주)영웅건설	20%

17. 지하수 이용부담금 부과․징수 현황

확인자	:	하수도과장		황병선	□
작성자	:	지하수계장		서정인	□

□ 부과징수 현황

(단위: 건, 백만원, %)

년 도	부 과		징 수			징수율(%)
	건수	금액(A)		건수	금액(B)	(B/A)
2022	4,212	245		4,071	242	98.9

□ 추 진 실 적

◦「익산시 지하수 관리 조례」제정 완료	: 2014. 04.

◦ 지하수이용부담금 부과·징수	: 2016. 09.

▸ 부과 제외 대상시설: 가정용, 농업용, 학교, 사회복지, 비상.간이 급수시설 등

▸ 이용부담금 부과면제: 부과금액이 월 2,000원 미만 (톤당 85원)

◦ 매월 지하수 사용량 검침 및 고지서 발송	: 2022. 01. ~ 12.

◦ 안전한 지하수 사용 홍보 및 체납분 납부 독려	: 2022. 01. ~ 12.

▸ 체납금 방문 및 전화 납부 촉구 징수 : 643건(징수액 16,953천원)

□ 문  제  점

◦ 지하수이용부담금에 대한 이해 부족(지하자원으로 무료 인식)

□ 향 후 계 획

◦ 지하수이용부담금 및 체납금 납부 독려

▸대  상 : 지하수 이용대상자 중 월 2,000원 이상 사용자 (톤당 85원) 및 체납자

▸관  리 : 체납자에 대해 현장 방문 및 압류예고 등 납부 독려