2023.  5.

제251회 익산시의회(1차 정례회)

2023 행정사무감사

	녹색도시환경국

녹색도시관리사업소

	□		감사자료 공통사항
			1.	2022 업무성과 및 반성 ………………………………	287
			2.	2022년도 예산집행 및 추진사항 ……………………	288
			3.	2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 ……	290
			4.	2022년도 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치 결과……	290
			5.	5분 자유 발언 조치 결과 ………………………………	291
			6.	시정질문 조치 결과……………………………	291
			7.	의원 발의 조례 제·개정 후 추진현황 ……………	291
			8.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	292
			9.	2022년도 각종 민원 접수 및 처리내역 ………	295
			10.	기금 운용 관련 ……………………………………	295
			11.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	295
			12.	용역사업 관련 ………………………………………	296
			13.	인․허가 민원처리 관련 사항 ………………………	297
			14.	각종공사 설계 변경상황 ……………………………	297
			15.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) …………………	299
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………………	300
			17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …………	301
			18.	지방보조금 성과평가내역 ………………………	302
			19.	2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 ………	303
			20.	2023년으로 명시이월한 내역 ………………………	304
			21.	2023년도 명시이월(의회제출) 후 2022년도에 집행한 내역…	304
			22.	예산 이용, 전용 및 예비비 집행 현황 ……………	305
			23.	공사 준공기한 연장 내역 ……………………………	305

				24.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	305
				25.	국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)…………	306
				26.	2022년도 계획사업 중 미착공사업 현황 …………	307
				27.	2022년도 계획사업 중 유보 및 취소된 사업현황 …	307
				28.	2022년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업 ………	307
				29.	2022년도 예산편성 후 전액 미집행 내역 ……………	308
				30.	예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황 ……………	308
				31.	소송 사건 현황 ……………………………………	309
				32.	시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ……	309
				33.	시설·사무 민간위탁 현황 …………………………	315
				34.	공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황 ……	315
				35.	진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황 …	316
				36.	시 산하 재단 설립 현황 …………………………	316
				37.	업무협약(MOU) 등 체결 현황 ……………………	316
	□		과 요구사항
				1.	공원녹지 시설관리 현황 …………………	319
				2.	공원녹지 수목관리 현황…………………	320
				3.	체육공원 운영 및 관리 현황 ………………	321
				4.	서동공원 관리 현황 ……………………	322
				5.	서동농촌테마공원 관리 현황 …………………	323

감사자료 공통사항

1. 2022 업무성과 및 반성

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□
		공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□
		테마공원계장		전현영	□

□ 성      과

◦ 공원 환경개선 및 시설물 안전점검 강화

‣신흥공원 수목 식재 및 산책로 조성(영산홍 외 3종 34,980주, 산책로 1,480m)

‣어린이 놀이기구 안전점검 42개소(12회), 정기검사 16개소, 모래소독 26개소(5,800㎡, 2회)

‣공원 내 공중화장실 불법 촬영 카메라 점검: 54개소(12회)

‣공원 전기설비 안전진단(약촌공원 외 85개소 분전함 및 공원등주)

◦ 체육공원 시설 개선

▸중앙체육공원 인도개보수 공사 : 산책로 탄성포장 및 보도블럭 교체

▸중앙체육공원 주차장 추가 조성 : 60면 ⇨ 180면

▸중앙체육공원 리뉴얼 사업 : 생태연못(572㎡) 및 구름다리 조성 등

▸영등시민공원 산책로 탄성포장 : 957㎡

▸배산체육공원 족구장 시설개선 : 족구장 확장(243㎡), 펜스 설치 등

▸체육공원 운동기구 교체 : 영등시민공원 20대, 중앙체육공원 7대

◦ 서동 및 농촌테마공원 시설 보강

▸서동공원 어린이 놀이시설 보강 : 조합놀이대 1식 등

▸농촌테마공원 휴게시설 보강 : 퍼걸러 4개소(정자형 2, 그네형 2), 파라솔 12개소 설치

▸농촌테마공원 경관조형물 설치 : 6종

□ 반      성

◦ 사업계획 변경 등에 따른 중앙체육공원 시설개선공사 추진 지연

▸배산체육공원 시설개선사업으로 신속한 행정절차 이행 및 실시설계 추진

2. 2022 예산집행 및 추진사항

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

【2022. 12. 31. 기준】	(단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예 산 현 액				지출액 (B)	이월액 (C)	반납 예정액 (D)	잔 액 (A-B-C-D)	비율 (B/A)	비고
				계 (A)	2022 예산액	명 시 이월액	사 고 이월액
녹색도시관리사업소				10,557,925	8,817,488	1,526,155	214,282	6,430,583	4,099,515	3,544	24,283	60.9	이월포함 (99.7%)
	서동농촌테마공원 운영			236,969	236,969	0	0	234,328	0	0	2,641	98.9
		서동농촌테마공원 관리		236,969	236,969	0	0	234,328	0	0	2,641	98.9
			서동농촌테마공원 시설관리	236,969	236,969	0	0	234,328	0	0	2,641	98.9
	체육공원의 효율적 운영			7,192,346	5,451,909	1,526,155	214,282	3,632,551	3,554,187	1,280	4,328	50.5
		체육공원 유지 관리		7,192,346	5,451,909	1,526,155	214,282	3,632,551	3,554,187	1,280	4,328	50.5
			중앙체육공원 유지 관리	1,194,225	979,943	0	214,282	1,193,973	0	0	252	99.9
			중앙체육공원 테니스장 유지 관리	14,300	14,300	0	0	14,300	0	0	0	100
			중앙체육공원 인도 개보수	926,155	0	926,155	0	922,037	0	961	3,157	99.6
			중앙체육공원 공원리뉴얼 조성사업	600,000	0	600,000	0	518,440	81,525	0	35	86.4	사고
			중앙체육공원 시설 개선공사	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	명시 참고1
			배산체육공원 유지 관리	287,219	287,219	0	0	287,198	0	0	21	99.9
			배산체육공원 기능보강 사업	830,000	830,000	0	0	187,538	642,462	0	0	22.6	명시 참고2
			영등시민공원 유지 관리	389,763	389,763	0	0	389,762	0	0	1	99.9
			영등시민공원 시설 개보수 공사	1,555,200	1,555,200	0	0	23,930	1,530,200	319	751	1.5	명시 참고3
			수도산체육공원 유지관리	95,484	95,484	0	0	95,374	0	0	110	99.9
	녹색도시 공원관리			2,930,799	2,930,799	0	0	2,367,695	545,328	2,264	15,512	80.8
		근린공원녹지관리		2,930,799	2,930,799	0	0	2,367,695	545,328	2,264	15,512	80.8
			공원녹지시설 유지관리	1,829,755	1,829,755	0	0	1,323,862	495,328	2,264	8,301	72.4	명시
			공원녹지 수목 유지관리	1,101,044	1,101,044	0	0	1,043,833	50,000	0	7,211	94.8	명시
	공원시설물관리			191,271	191,271	0	0	189,599	0	0	1,672	99.1
		공원시설관리		191,271	191,271	0	0	189,599	0	0	1,672	99.1
			서동공원 시설 관리	191,271	191,271	0	0	189,599	0	0	1,672	99.1
	행정운영경비			6,540	6,540	0	0	6,410	0	0	130	98.0
		기본경비		6,540	6,540	0	0	6,410	0	0	130	98.0
			기본경비	6,540	6,540	0	0	6,410	0	0	130	98.0

(참고) 2022년 예산집행 부진 사유 (비율 70% 미만)

(단위 : 천원, %)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	비율	부 진 사 유
1	중앙체육공원 시설개선공사	1,300,000	0	0	‧사업추진계획 변경에 따른 지연 (당초: 중앙체육공원 -> 변경: 배산체육공원)
2	배산체육공원 기능보강사업	830,000	187,538	22.6	‧동절기 시공품질 저하 우려에 따른 공사중지 (23년 7월 완료)
3	영등시민공원 시설 개보수 공사	1,555,200	23,930	1.5	‧2회추경 예산확보 후 사업추진에 따른 부진

3. 2022년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치결과

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□
		테마공원계장		전현영	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•도시공원 및 녹지관리 추진 현황 ▸공원 시설물 훼손이 많음, 내구연한 및 시설보수 우선순위에 따라 보수할 수 있도록 노력해주시기 바람.	▸공원 시설물을 주기적으로 점검하여 훼손된 시설물을 빠르게 수리조치하고, 노후된 시설물도 우선순위에 따라 수리
2	•동물체험관 악취해소 및 입장료 인상 지양 ▸동물체험관의 분뇨로 인한 악취 문제가 지속적으로 발생하고 있어 악취 문제 해소를 위한 특단의 대책을 마련하기 바라며, 입장료에 대해서도 익산시민의 편의를 위해 인상이 지양될 수 있도록 노력하기 바람.	▸수시로 분뇨처리 전문업체에서 수거하고 있으며 악취 제거를 위해 농업미생물(EM)을 1일 2회 살포하고 있음 ▸입장료 인상 시 익산시민에 대하여는 현재 입장료에서 인상되지 않도록 지속 협의

4. 2022년도 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

5. 5분 자유발언 조치 결과

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

발언 의원 / 발언 회기	발언 요지	처리결과 및 금후계획	비고
박종대의원 /246회 1차 정례회 (2022.10.07.)	∙배산체육공원 내 야외음악당의 차광막 설치 필요	▸2023년 배산체육공원 시설개선공사로 막구조물 교체하여 차광막 설치예정

6. 시정질문 조치 결과

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

7. 의원 발의 조례 제‧개정 후 추진현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

8. 주요 사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□
		테마공원계장		전현영	□

(단위:천원,%)

구분	사 업 명	사업개요	사업비	집행액	집행율	비고
공사	중앙체육공원 주차장 조성사업	·기 간 : 21.12. ~ 22. 8. ·사 업 량 :주차장(120면)조성 ·총사업비 : 928,673천원 ·위 치 : 중앙체육공원	▸21년도: 214,282 →22년 사고이월 (165,000 특교세 49,181 시비) ▸22년도:714,391(시비)	928,537	99	공사완료 (22년8월)
공사	중앙체육공원 인도개보수공사	·기 간 : 21. 1. ~ 22. 6. ·사 업 량 : 보도블럭, 탄성포장 등 20,412㎡ 보수 ·총사업비 : 926,155천원 ·위 치 : 중앙체육공원	▸22년도 : 926,155 (217,363 기금) (708,792 시비)	922,037	99	공사완료 (22년5월)
공사	중앙체육공원 리뉴얼 조성사업	·기 간 : 21. 8. ~ 23. 2. ·사 업 량 : 목교, 울타리, 옹벽, 테니스장 휀스, 조명타워 등 ·총사업비 : 600,000천원 ·위 치 : 중앙체육공원	▸21년도:600,000 →22년 명시이월(특교세)	518,440	86	공사완료 (23년2월)
공사	중앙체육공원 시설개선공사	·기 간 : 23. 1. ~ 23. 12. ·사 업 량 : 야외음악당 보강, 테니스장 인조잔디 설치 ·총사업비 : 1,300,000천원 ·위 치 : (당초)중앙체육공원 (변경)배산체육공원	▸22년도 : 1,300,000 (390,000 균특) (910,000 시비)	0	0	명시이월 설계착수 (23년1월)
공사	배산체육공원 족구장 시설개선공사	·기 간 : 22. 6. ~ 22. 8. ·사 업 량 : 족구장 부지확장, 수목 및 퍼걸러 이설 ·총사업비 : 68,081천원 ·위 치 : 배산체육공원	▸22년도 : 68,081(시비)	68,081	100	공사완료 (22년8월)
공사	배산체육공원 기능보강사업	·기 간 : 22. 2. ~ 23. 7. ·사 업 량 : 놀이터조성, 화장실리모델링 등 시설보강 ·총사업비 : 830,000천원 ·위 치 : 배산체육공원	▸22년도 : 830,000 (249,000 기금) (581,000 시비)	187,538	22	명시이월 공사완료 (23년7월)
물품	영등시민공원 야외운동기구 구입	·기 간 : 22. 1. ~ 22. 2. ·사 업 량 : 운동기구 25대 ·총사업비 : 60,000천원 ·위 치 : 중앙, 영등시민공원	▸22년도 : 60,000(시비)	56,358	93	납품완료 (22년2월)
공사	영등시민공원 시설 개보수 공사	·기 간 : 22.11. ~ 23. 12. ·사 업 량 : 축구장 , 풋살장 인조잔디 교체, 산책로 경관조명 등 ·총사업비 : 1,555,200천원 ·위 치 : 영등시민공원	▸22년도 : 1,555,200 (466,600 기금) (1,088,600 시비)	23,930	1.5	명시이월 설계착수 (22년11월)
공사	2022년공원 전기시설물 유지보수 공사(단가계약)	·기 간 : 22. 3. ~ 22.12. ·사 업 량 : 전선관 신설 외 102개 품목 ·총사업비 : 41,705천원 ·위 치 : 배산공원 외 83개소	▸22년도 : 41,705(시비)	41,705	100	공사완료 (22년9월)
공사	모현공원 음향설비 설치공사	·기 간 : 22. 5. ~ 22. 6. ·사 업 량 : 오디오 앰프(2대) 및 스피커(24개) 등 설치 ·총사업비 : 42,735천원 ·위 치 : 모현공원	▸22년도 : 42,735(시비)	42,735	100	공사완료 (22년6월)
물품	등나무공원 외 2개소 설치용 퍼걸러 등 구입	·기 간 : 22. 9. ~ 22.11. ·사 업 량 : 퍼걸러 13조, 평의자 4개 ·총사업비 : 75,470천원 ·위 치 : 등나무어린이공원 외 2개소	▸22년도 : 75,470(시비)	75,470	100	설치완료 (22년11월)
공사	팔봉한솔공원 축구장 재정비 사업	·기 간 : 22.10. ~ 23. 1. ·사 업 량 -토 공: 터파기 3,740㎥, 토사상차 3,740㎥, 바닥정지 9,097㎡ -포장공: 보조기층 포설 및 다짐 3,073㎥, 유공관 접합 및 부설(⏀150) 720m, 유공관 접합 및 부설(⏀300) 233m ·총사업비 : 193,672천원 ·위 치 : 팔봉한솔공원	▸22년도 : 193,672(시비)	193,672	100	공사완료 (22년12월)
공사	신흥근린 공원 수목식재 공사	·기 간 : 22. 3. ~ 22. 4. ·사 업 량 : 영산홍 9,480주 식재 ·총사업비 : 57,503천원 ·위 치 : 신흥근린공원	▸22년도 : 57,503(시비)	57,503	100	공사완료 (22년3월)
공사	2022년 제3 산업단지 녹지예초사업	·기 간 : 22. 5. ~ 22. 7. ·사 업 량 : 예초 143,433㎡ ·총사업비 : 50,958천원 ·위 치 : 제3산업단지 녹지	▸22년도 : 50,958(시비)	50,958	100	공사완료 (22년7월)
공사	제3, 4산업 단지 녹지 예초 사업	·기 간 : 22. 09. ~ 22.10. ·사 업 량 : 예초 96,778㎡ ·총사업비 : 34,681천원 ·위 치 : 제3,4산업단지 녹지	▸22년도 : 34,681(시비)	34,681	100	공사완료 (22년10월)
공사	서동농촌테마 공원 잔디식재 공사	·기 간 : 22. 3. ~ 22. 5. ·사 업 량 : 3,108㎡ ·총사업비 : 46,936천원 ·위 치 : 서동농촌테마공원 내	▸22년도 : 46,936(시비)	46,936	100	공사완료 (22년5월)
물품	서동공원 어린이 조합놀이대 구입	·기 간 : 22. 4. ~ 22. 5. ·사 업 량 : 조합놀이대 1조 ·총사업비 : 64,982천원 ·위 치 : 서동공원 내	▸22년도 : 64,982(시비)	64,982	100	구입·설치 완료 (22년5월)

9. 2022년도 각종 민원 접수 및 처리 내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

10. 기금 운용 관련

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

11. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

12. 용역사업 관련

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□
		공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□

□ 용역사업 추진 현황

(단위 : 천원)

용역구분	용 역 명	예산액	계약금액	집행액	용역업체	계약방법	비고
설계	영등시민공원 시설 개보수 공사 실시설계 용역	1,555,200	50,377	23,930	㈜태원엔지니어링	경쟁입찰	선급금
일반	2022년 신흥공원 임목폐기물 처리 용역	7,300	7,300	7,300	(유)해머	수의계약
일반	신흥공원 임목폐기물 처리 용역(2차)	2,840	2,840	2,840	(유)해머	수의계약
설계	모현공원 음향설비 설치공사 실시설계 용역	3,715	3,650	3,650	(유)광진이엔지	수의계약
일반	2022년 익산시 상반기 어린이 놀이시설 모래소독 용역	12,990	11,248	11,248	(유)현대그린환경	수의계약
설계	국가식품클러스터 2호공원 옹벽 시설물 보수 공사 실시설계 용역	3,371	3,320	3,320	㈜주한건설기술단	수의계약
일반	팔봉한솔공원 족구장 휀스 수리 용역	7,244	6,930	6,930	들소스포츠산업	수의계약
설계	팔봉한솔공원 축구장 재정비사업(인조잔디 포장 등)실시설계 용역	12,092	11,000	11,000	㈜태원엔지니어링	수의계약
일반	2022년 공원 전기설비 안전진단 용역	6,300	6,200	6,200	한국전기 안전공사	수의계약
일반	2022년 익산시 하반기 어린이 놀이시설 모래소독 용역	12,900	11,100	11,100	성원환경산업	수의계약
설계	중앙체육공원 리뉴얼 조성사업 실시설계 용역	600,000	36,358	36,358	㈜한가람	경쟁입찰

13. 인․허가 민원처리 관련 사항

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

14. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

(단위:천원)

일자	사업명	당초	변경	계약자	증△감	공 사 기 간	변 경 사 유
04.21.	중앙체육공원 주차장 조성사업	213,180	218,318	㈜건아개발	5,138	21.12.02.~22.04.23.	·기존 구조물 철거수량 누락분 반영
04.22.	중앙체육공원 인도개보수 공사	574,133	575,804	(유)정원건설	1,670	21.10.15.~22.06.02.	·현장여건 반영에 따라 보행매트설치, 수로관설치, 탄성포장구간축소 등 수량조정
06.21.	영등시민공원 산책로 탄성 포장재 교체공사	17,950	24,011	(유)시경	6,061	22.05.04.~22.07.02.	·현장여건 반영에 따라 레미콘 및 폐기물 소운반 수량반영
08.08.	배산체육공원 족구장 시설개선 공사	44,840	53,142	(유)대길건설	8,301	22.06.20.~22.08.18.	·현장여건 반영에 따라 파고라이설 추가 및 경계석 철거수량 등 조정
08.23.	중앙체육공원 주차장 조성사업 (2차분)	171,672	321,094	㈜건아개발	149,421	22.02.14.~22.08.25.	·주차장바닥 포장 변경(아스콘 → 잔디블록) 및 수목이식 수량증가 등
10.12.	중앙체육공원 리뉴얼 조성사업(토목,조경)	147,333	144,463	㈜한백건설	△2,870	22.04.22.~22.10.21.	·회양목, 철쭉식재 추가, 파고라 → 팔각정 변경, 급수시설 삭제
10.21.	중앙체육공원 리뉴얼조성사업 (전기)	196,053	161,711	㈜하랑	△34,342	22.04.29.~22.10.28.	·연못 급수시스템 변경, 살균장치 제외, 불필요 공정 삭제 등
10.24.	배산체육공원 기능보강사업 폐기물처리용역	32,112	20,707	(유)진영환경	△11,405	22.10.04.~22.12.02.	·폐고무처리 별도발주 필요에 따라 폐고무 처리수량 제외
12.15.	배산체육공원 기능보강사업 화장실 보수공사	167,790	195,852	㈜신영건설	26,061	22.10.11. ~23.04.10.	·기존 페인트도색방식을 메쉬시공방식으로 벽체 보강 변경 및 콘크리트 실제 철거물량 반영 등

15. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□
		테마공원계장		전현영	□

(단위:천원, %)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	집행액	사업기간	진도
계	14건	6,676,299	3,116,753
중앙체육공원 인도개보수공사	보도블럭, 탄성포장 등 20,412㎡ 보수	926,155	922,037	21.01. ~22.06.	100
중앙체육공원 주차장 조성사업	주차장(120면)조성	928,673	928,537	21.12. ~22.08.	100
중앙체육공원 리뉴얼 조성사업	목교, 울타리, 옹벽, 테니스장 휀스, 조명타워 등	600,000	518,440	21.08. ~23.02.	86
배산체육공원기능 보강사업(토목,조경)	놀이터조성, 화장실리모델링 등 시설보강	830,000	187,538	22.02. ~23.07.	23
중앙체육공원 시설개선공사	야외음악당 막구조물 보강, 테니스장 인조잔디 설치 등	1,300,000	0	23.01. ~23.12.	0
영등시민공원 시설 개보수 공사	축구장, 풋살장 인조잔디교체, 산책로 경관조명 설치 등	1,555,200	23,930	22.11. ~23.12.	2
신흥근린공원 수목 식재 공사	영산홍 9,480주 식재	57,503	57,503	22.03. ~22.04.	100
서동농촌테마공원 잔디식재 공사	잔디 3,108㎡ 식재	46,936	46,936	22.3. ~22.5.	100
2022년 공원 전기시설물 유지보수 공사(단가계약)	전선관 신설 외 102개 품목	41,705	41,705	22.03. ~22.12.	100
모현공원 음향설비 설치공사	오디오 앰프(2대) 및 스피커(24개) 등 설치	42,735	42,735	22.05. ~22.06.	100
2022년 제3산업단지 녹지 예초사업	예초 143,433㎡	50,958	50,958	22.5. ~22.7.	100
배산체육공원 족구장 시설개선공사	족구장 부지확장, 수목 및 퍼걸러 이설	68,081	68,081	22.06. ~22.08.	100
제3,4산업단지 녹지 예초 사업	예초 96,778㎡	34,681	34,681	22.09. ~22.10.	100
팔봉한솔공원 축구장 재정비 사업	-토공:터파기 3,740㎥, 토사상차 3,740㎥, 바닥정지 9,097㎡ -포장공:보조기층 포설 및 다짐 3,073㎥, 유공관 접합 및 부설(⏀150) 720m, 유공관 접합 및 부설(⏀300) 233m	193,672	193,672	22.10. ~23.01.	100

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

(단위:천원)

보조사업명	사업량	구분	예산현액	집행액	잔 액	비고
계			6,140,028	2,580,483	3,559,545
중앙체육공원 주차장 조성사업	주차장 (120면)조성	계	928,673	928,538	135
		국비	165,101	165,101	0
		도비	0	0	0
		시비	763,572	763,437	135
중앙체육공원 인도개보수공사	보도블럭, 탄성포장 등 20,412㎡ 보수	계	926,155	922,037	4,118
		국비	217,363	216,397	961
		도비	0	0	0
		시비	708,792	705,640	3,157
중앙체육공원 리뉴얼 조성사업	목교, 울타리, 옹벽, 테니스장 휀스, 조명타워 등	계	600,000	518,440	81,560	사고이월 공사완료 (23년2월)
		국비	600,000	518,440	81,560
		도비	0	0	0
		시비	0	0	0
배산체육공원 기능보강사업 (토목,조경)	놀이터 조성, 화장실 리모델링 등 시설보강	계	830,000	187,538	642,462	명시이월 공사완료 (23년7월)
		국비	249,000	56,261	192,739
		도비	0	0	0
		시비	581,000	131,277	449,723

보조사업명	사업량	구분	예산현액	집행액	잔 액	비고
중앙체육공원 시설 개선공사	야외음악당 보강, 테니스장 인조잔디 설치 등	계	1,300,000	0	1,300,000	명시이월 사업추진 계획변경 (당초 : 중앙체육공원, 변경 : 배산체육공원)
		국비	390,000	0	390,000
		도비	0	0
		시비	910,000	0	910,000
영등시민공원 시설 개보수 공사	축구장, 풋살장 인조잔디 교체, 산책로 경관조명 설치 등	계	1,555,200	23,930	1,531,270	명시이월 2회추경 예산확보
		국비	466,600	7,181	459,419
		도비	0	0	0
		시비	1,088,600	16,749	1,071,851

18. 지방보조금 성과평가내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

19. 2022년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

(단위:천원)

사 업 명	구 분	예산현액 (이월액)		집 행 액		비고(이월사유)
계		1,740,437		1,654,759
중앙체육공원 리뉴얼 조성사업	명시이월	계	600,000	계	518,440	사업기간 부족에 따른 예산이월 (장기공사)
		당해	0	당해	0
		이월	600,000	이월	518,440
중앙체육공원 인도 개보수공사	명시이월	계	926,155	계	922,037	사업기간 부족에 따른 예산이월 (장기공사)
		당해	0	당해	0
		이월	926,155	이월	922,037
중앙체육공원 주차장 조성사업	사고이월	계	214,282	계	214,282	토지매입비 잔여 예산을 공사비로 활용하기 위해 예산이월 (장기공사)
		당해	0	당해	0
		이월	214,282	이월	214,282

20. 2023년으로 명시이월한 내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액	집행액	이월액	비고
5건	4,435,200	416,140	4,017,990
팔봉한솔공원 축구장 재정비 사업	700,000	204,672	495,328	2회 추경 예산
모현공원 저류조 화목류 식재사업	50,000	0	50,000	결산 추경 예산
중앙체육공원 시설 개선공사	1,300,000	0	1,300,000	사업추진계획변경 (중앙체육공원→ 배산체육공원)
배산체육공원 기능보강 사업	830,000	187,538	642,462	동절기 시공품질 저하 우려 공사중지
영등시민공원 시설 개보수 공사	1,555,200	23,930	1,530,200	2회 추경 예산

21. 2023년도 명시이월(의회제출) 후 2022년도에 집행한 내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

(단위 : 천원)

사 업 명	명시이월액 (의회제출)	의회제출 이후 2022년도 집행액	집행사유
계	788,379	145,917
배산체육공원 기능보강사업	788,379	145,917	공사 관급자재 지출

22. 예산이용, 전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

23. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

24. 국․도비예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

25. 국․도비 반납 현황 및 사유(2022년도 반납건)

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□

□ 2022년도 반납건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	0	16,800	0	363
배산부영공원 산책로 잔디 등 및 해충 포집기 설치	0	16,800	0	363	집행잔액

□ 2023년도 반납예정건

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 현 액		반 납 예 정 액		사 유	비고
	국비	도비	국비	도비
계	683,963	11,000	1,280	2,264
돌숲공원 야외 운동기구 설치	0	11,000	0	2,264	집행잔액
중앙체육공원 인도개보수	217,363	0	961	0	집행잔액
영등시민공원시설 개보수공사	466,600	0	319	0	집행잔액

26. 2022년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액				사 유	비고
	계	국비	도비	시비
중앙체육공원 시설개선공사	1,300,000	390,000	0	910,000	사업추진계획 변경에 따른 지연 (당초: 중앙체육공원 → 변경: 배산체육공원)

27. 2022년도 계획사업 중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

28. 2022년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

29. 2022년도 예산 편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

(단위:천원)

사업명	사 업 량	구분	예산현액	미집행사유	금후계획	비고
계			1,300,000
중앙체육공원 시설개선공사	중앙체육공원내 주차장, 연못, 조명,편의시설 등 개선	계	1,300,000	‧사업추진계획 변경에 따른 지연 (당초: 중앙체육공원 -> 변경: 배산체육공원)	‧배산체육공원 시설 개선공사 실시설계 : 2023. 1. ~ 5. ‧배산체육공원 시설 개선공사 추진 : 2023. 6. ~ 12.
		국비	390,000
		도비	0
		시비	910,000

30. 예산편성목과 다르게 집행된 예산 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

□ 예산의 변경 사용 현황

(단위 : 천원)

연번	세부사업	통계목	당초 예산액	변경액		집행액	변 경 사 유	비고
				감	증
	계		342,300	4,501	4,501
1	공원녹지시설 유지관리	사무 관리비	68,420	4,501	-	63,919	공원 및 녹지시설 상하수도 사용 요금 납부	2022. 12.23.
	공원녹지시설 유지관리	공공 운영비	273,880	-	4,501	278,381

31. 소송 사건 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

32. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□
		공원관리계장		김진형	□
		체육공원계장		최종섭	□
		테마공원계장		전현영	□

▣ 민원 유형별 현황

구 분	접 수 건 수	처 리 건 수	비 고
계	63	63
공원녹지 시설 유지관리	32	32
공원녹지 수목 유지관리	7	7
체육공원유지과리	22	22
서동공원 유지관리	0	0
서동농촌테마공원 유지관리	2	2

▣ 세부 민원처리 내역

연번	접수	건 명	민원내용	처리내용
1	시정에바란다 (1.6.)	신흥공원 반려견 단속	공원 내 반려견 목줄미착용 및 화장실 설치 요청	현수막 설치 완료 및 화장실 설치 검토 추진
2	시정에바란다 (1.18.)	수도산체육공원	풋살장 잔디교체 요청	23년 본예산 1,108백만원 계상, 7월중 보수예정
3	시정에바란다 (1.18.)	수도산체육공원	풋살장 잔디 및 그물망 보수요청	23년 본예산 1,108백만원 계상, 7월중 보수예정
4	시정에바란다 (1.30.)	휠체어 경사로 보수	고봉로공원 경사로 보수 요청	경사로 보수 완료
5	시정에 바란다(1.31.)	산책로공원 주취자	산책로공원 주취자 단속 요청	계도 및 단속 완료
6	시정에 바란다(2.11.)	푸른솔공원 도박	푸른솔공원 도박 등 단속 요청	계도 및 단속 완료
7	시정에바란다 (2.20.)	수도산체육공원	산책로 바닥 훼손	봄철 꽃 식재 및 산책로 바닥 복구
8	시정에바란다 (3.15.)	부송공원 내 나무	부송공원 나무 전지 요청	수목 전지 완료
9	시정에바란다 (3.16.)	중앙체육공원	주차장조성공사 부근 임시인도 개설요청	인도 임시복구 및 안전조치 실시완료
10	시정에 바란다(3.21.)	부송공원 내 나무 전지	부송공원 수목 전지 요청	수목 전지 완료
11	시정에 바란다(3.26.)	산책로공원 주취자	산책로공원 주취자 노상방뇨 단속 요청	계도 및 단속 완료
12	시정에 바란다(3.29.)	모현공원 개 목줄	모현공원 개 목줄 단속 요청	계도 및 단속 완료
13	시정에바란다 (4.11.)	액션하우스	액션하우스 동물관리 소홀	액션하우스측에 동물관리 철저토록 계도 실시
14	소극행정 신고하기 (4.11.)	왕궁 식품클러스터 3호공원	풋살장 사용 관련 안내 불만	풋살장 사용 관련 상세히 안내(완료)
15	시정에바란다(4.18.)	신동어린이공원	남자화장실 출입문 파손 및 공원등 보수 요청	보수 완료
16	시정에바란다(4.22.)	부송공원 안건	부송공원 내 시설물 점검 요청	시설물 점검(완료)
17	시정에바란다(4.26.)	공원관리 요청	배산전원공원 내 잡풀 제거 요청, 불법 무단 경작 및 폐기물 방치 등 단속 요망	잡풀 제거 작업 처리완료, 무단 경작 및 폐기물 방치 계도 및 단속(완료)
18	시정에바란다(4.30.)	팔봉한솔공원	농구 골대 네트 보수 및 산책로 풀 정리 요청	완료
19	시정에 바란다(5.4.)	개 목줄 단속	모현공원 개 목줄 단속 요청	계도 및 단속 완료
20	시정에 바란다(5.9.)	모현공원 현수막 설치	모현공원 금연구역 및 반려견 입마개 관련 현수막 설치 요청	설치 완료
21	시정에바란다(5.10.)	부송공원	산책로 정비 요청	정비 완료
22	시정에 바란다(5.12.)	부송어린이공원 나무전지 건 재요청	부송공원 수목 전지 재요청	전지 완료
23	시정에바란다(5.19.)	옛뚝시민공원 화장실단수	동산동 옛뚝공원화장실 관리 요청	정비 완료
24	시정에바란다 (5.19.)	수도산체육공원	제초 및 전지작업 요청	제초 및 전지 완료
25	시정에바란다 (5.28.)	중앙체육공원	산책로 벤치 바닥 변경요청 (흙->벽돌)	벤치바닥 일부 보도블럭 교체완료
26	시정에 바란다(6.2.)	예초 및 야자매트 설치 요청	배산전원공원 예초 및 야자매트 설치, 불법경작 단속 요청	예초 및 야자매트 설치완료, 불법경작 계도 및 단속(완료)
27	시정에바란다 (6.11.)	중앙체육공원	풋살장 야간소음 조치요청	23시 이후로 사용 못 하게 계도 및 현수막 게시
28	시정에 바란다(6.12.)	익산시 물분수	모현공원 내 바닥분수 가동 요청	완료
29	시정에 바란다(6.14.)	공원 나무 물공급	배산부영공원 수목 급수 요청	완료
30	시정에바란다 (6.19.)	중앙체육공원	산책로 바닥 거리표시 수정요청	수정완료
31	시정에 바란다(6.20.)	공원 내 수목 이름표 달기	관내 공원 수목 및 초화류 표찰 설치 요청	관내 공원 수목 및 초화류 표찰 조사 후 설치 예정
32	시정에바란다(7.6.)	배상 문의	물결공원 인근 차량 긁힘 사고 배상 요청	해당지역은 개인 사유지로 배상 불가(완료)
33	시정에바란다 (7.6.)	중앙체육공원	스마트퍼걸러 휴대폰 무선충전기 사용방법 요청	무선충전기 사용방법 게시
34	시정에바란다(7.10.)	궁동 어린이공원 내 화장실	궁동어린이공원 화장실 노후화로 인한 재건축 요청	현지출장 후 노후 정도와 이용객 수를 감안하여 검토
35	시정에 바란다(7.12.)	공원 음주 단속	백제어린이공원 음주 단속 요청	계도 및 단속(완료)
36	시정에바란다 (7.13.)	영등시민공원	에어로빅 음악소리	음악소리 볼륨조정 완료
37	시정에바란다 (7.14.)	중앙체육공원	스마트폰 충전 방법 게시 요청	충전방법 안내표 설치 완료
38	시정에 바란다(7.16.)	소라산공원 약수터 목욕	소라산공원 약수터 목욕 단속 요청	계도 및 단속(완료)
39	시정에 바란다(7.18)	신동어린이공원 화장실	신동어린이공원 화장실 램프 보수 요청	보수 완료
40	시정에바란다 (7.20.)	영등시민공원	바닥분수 가동주기 조정요청	가동시간 조정완료
41	시정에바란다(7.21.)	물결공원	답변 관련 불만	불편함이 없도록 답변(완료)
42	시정에바란다(8.7.)	익산초공원 체육시설	운동기구 추가 설치 요청	종합적으로 검토하겠음
43	시정에 바란다(8.8.)	풀제거	신동어린이공원 예초 요청	완료
44	시정에바란다(8.17.)	신동어린이공원	화장실 출입문 수리 및 보도블럭 정비 요청	화장실 출입문 수리완료 및 보도블럭 정비 완료
45	시정에바란다 (8.17.)	신동어린이공원	보도블록 정비 요청	보수 완료
46	시정에바란다 (8.18.)	영등시민공원	계단 미끄럼방지 및 반사테이프 설치요청	반사테이프 및 논슬립 설치완료
47	시정에 바란다(8.25)	고봉로어린이공원 공원등	고봉로어린이공원 공원등 보수 요청	보수 완료
48	시정에바란다 (8.26.)	중앙체육공원	산책로 거리 표기 정정 요청	산책로 거리표지판 점검 후 수정 완료
49	시정에바란다 (8.26.)	영등시민공원	자전거 공기주입기 수리 요청	보수 완료
50	시정에바란다 (8.27.)	중앙체육공원	유실수 관리 요청	현수막 설치 및 수시 계도
51	시정에 바란다(9.7)	고봉로어린이공원 공원등	고봉로어린이공원 공원등 보수 요청	보수 완료
52	시정에바란다(9.17.)	모현도서관 주차문제 (LH 허 차량)	주차문제 해결 요청	완료
53	시정에바란다 (9.18.)	영등시민공원 건의	반려견 놀이터 문의	반려견 놀이터는 공원 부지면적의 20%를 초과할 수 없으며, 종합적인 검토 후 결정하겠음
54	시정에바란다 (9.19.)	배산체육공원	대학 테니스동아리 테니스장이용료 감면요청	조례 상 65세이상, 청소년, 군인, 장애인 외 감면사항이 없음을 안내
55	시정에 바란다(9.26.)	고봉로 어린이공원 가로등 보수	고봉로어린이공원 가로등 보수 및 수목 전정 요청	완료
56	시정에 바란다(10.23)	한솔공원 족구장	한솔공원 족구장 조명등 보수 요청	보수 완료
57	시정에 바란다 (10.24)	서동농촌테마공원내 국민 여가캠핑장 조성	서동농촌테마공원내 국민 여가캠핑장 조성 건의	우리시 환경정책과에서 생태관광지 조성사업의 일환으로 에코캠핑장 조성계획중임을 답변
58	시정에 바란다(11.4)	모현공원 공원등	모현공원 공원등 추가 설치 및 불법 전동기 이용자 단속 요청	공원등 추가 설치 및 전동기 이용자 계도 및 단속(완료)
59	시정에 바란다 (11.6)	배산체육공원	축구장 흡연자 단속요청	안내방송 실시 및 수시계도
60	시정에바란다(11.23.)	팔봉한솔공원 관리	팔봉한솔공원 테니스장 인조잔디 설치 및 노후된 등주 교체 요청	인조잔디 설치는 추후 검토, 공원등 교체 완료
61	시정에바란다 (12.5.)	중앙체육공원	주차장 안내 간판 교체 요청	안내판 교체 완료
62	시정에바란다 (12.24.)	영등시민공원	풋살장 구장 관리 요청	23년 본예산 1,530백만원 계상, 7월중 보수예정
63	시정에바란다 (12.26.)	수도산체육공원	풋살장 제설작업 요청	제설작업 완료

33. 시설․사무 민간위탁 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	테마공원계장		전현영	□

시설명	수탁기관	위‧수탁금액	동의 관련			비 고
			의회동의여부(근거)	의회동의 승인기간	위‧수탁 체결기간
생태동물 체험관	농업회사법인 (유)액션하우스	21,949천원	여(익산시 사무의 위탁 조례 제7조)	2021. 12. 1.~ 2023. 11. 30.	2021. 12. 1.~ 2023. 11. 30.	시설 위탁

34. 공유재산관리계획 승인에 대한 건별 진행 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

35. 진행중인 사업 중 민원으로 인해 중지 또는 취소된 사업 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

36. 시 산하 재단 설립 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

37. 업무협약(MOU) 등 체결 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□

해 당 없 음

과 요구사항

1. 공원녹지 시설관리 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	녹색도시관리계장		김대영	□
		공원관리계장		김진형	□

□ 사 업 개 요

◦ 관리대상 : 157개소 307.2ha(공원 79개소 247.3ha, 녹지 71개소 42.5ha, 기타 7개소 17.4ha)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,829백만원

◦ 사업내용 : 공원 및 녹지 시설물 설치 및 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 공원 및 녹지 시설물 설치 및 유지관리

▸음수대(4대), 퍼걸러(16조), 운동기구(8대), 보행매트(2,120m), 의자(28개) 설치

▸운동기구 등 노후·파손 시설물 보수(모현공원 외 69개소)

◦ 공원 및 녹지 전기시설물 설치 및 유지관리

▸음향설비(1개소), 잔디등(20개), 해충포집기(4대), 흙먼지털이기(1개소), 누전선로(7개소)

▸공원등 및 기타 고장 전기시설물 보수(배산근린공원 외 62개소)

◦ 공원 시설물 안전점검

▸어린이놀이기구 안전점검 : 안전점검 42개소(12회), 정기검사(16개소)

▸어린이놀이터 모래소독 26개소(5,800㎡, 기생충란, 중금속) : 2회

▸공원 내 공중화장실 불법 카메라 점검 : 54개소(12회)

▸공원 전기시설 안전진단 : 약촌공원 외 85개소 분전함 및 공원등주

◦ 공원(녹지) 환경 및 시설 정비

▸기간제근로자(10명) 사역하여 화장실(54개소) 등 공원 환경정비 및 시설정비

□ 문제점 및 향후계획

◦ 공원등 램프 및 운동기구 등 시설물 파손 보수 지연으로 시민 불편 초래

▸지속적 유지관리 및 신속한 보수 추진

◦ 공원 출입 반려견 목줄 미착용 및 배설물 미처리로 인한 민원 발생

▸지속적인 홍보 및 계도를 통한 청결하고 깨끗한 공원 환경 개선

2. 공원녹지 수목관리 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	공원관리계장		김진형	□

□ 사 업 개 요

◦ 관리대상 : 157개소 307.2ha(공원 79개소 247.3ha, 녹지 71개소 42.5ha, 기타 7개소 17.4ha)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,101백만원

◦ 사업내용 : 공원 및 녹지 수목 식재 및 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 수목식재 : 영산홍 외 3종 35,680주(신흥근린공원 외 2개소)

◦ 수목관리

▸수목전지 : 소나무 외 7종 119주(배산부영어린이공원 외 10개소)

▸지주끈정비 : 소나무 210주(중앙체육공원 외 6개소)

▸수목병해충 방제 : 모현공원 외 156개소(2~4회 실시)

◦ 예초작업 : 780,700㎡(어양공원 외 139개소)

◦ 공원 수목 정비 및 환경개선

▸기간제근로자(24명) 사역하여 수목가지치기, 병해충 방제, 제초, 기타 : 수시시행

□ 문제점 및 향후계획

◦ 기간제근로자 안전의식 부족으로 안전사고 위험 노출

▸정기적인 안전교육과 수시 현장점검 및 지도로 안전사고 사전 예방

◦ 시기별 민원 집중에 따른 신속 처리 지연

▸전지, 제초, 병해충 방제 등 사전 조치를 통한 민원 발생 최소화

3. 체육공원 운영 및 관리 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	체육공원계장		최종섭	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 대    상 : 4개소(중앙, 배산, 영등, 수도산체육공원)

◦ 사 업 비 : 3,997백만원

◦ 사업내용 : 공원 내 체육시설물 관리 및 유지보수 등

□ 추 진 실 적

◦ 체육공원 운동기구 교체 완료(77백만원)	: 2022. 2.

◦ 영등시민공원 먼지떨이 에어건 설치공사 준공(18백만원)	: 2022. 2.

◦ 영등시민공원 인라인장 주변 배수로 공사 준공(15백만원)	: 2022. 5.

◦ 중앙체육공원 인도 개보수 공사 준공(926백만원)	: 2022. 5.

◦ 영등시민공원 산책로 탄성포장재 교체완료(100백만원)	: 2022. 6.

◦ 중앙체육공원 주차장 조성공사 준공(700백만원)	: 2022. 8.

◦ 배산체육공원 족구장 시설개선공사 준공(70백만원)	: 2022. 8.

◦ 체육공원(중앙,배산) 조경 기능보강사업 준공(40백만원)	: 2022. 10.

◦ 배산체육공원 기능보강사업 실시설계용역 완료(37백만원)	: 2022. 10.

◦ 배산체육공원 기능보강사업 착공(793백만원)	: 2022. 10.

◦ 영등시민공원 시설개보수공사 실시설계용역 착수(57백만원)	: 2022. 11.

□ 문  제  점

◦ 체육공원이 조성된지 14~26년이 경과되어 시설이 노후화됨에 따라 지속적인 보수·보강 필요(중앙체육공원(2002년 준공), 영등(1997년 준공), 배산(2006년 준공), 수도산(2009년 준공))

◦ 이용객의 공원에 대한 요구사항이 증가하는 반면 제한된 예산으로 조치할 수 있는 한계

□ 향 후 계 획

◦ 중앙체육공원 리뉴얼 조성공사 준공(600백만원)	: 2023. 2.

◦ 영등시민공원 시설개보수공사 실시설계용역 준공(57백만원)	: 2023. 3.

◦ 배산체육공원 기능보강사업 준공(793백만원)	: 2023. 7.

4. 서동공원 관리 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	테마공원계장		전현영	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 191백만원

◦ 사업내용 : 서동공원 시설보강 및 유지관리

◦ 주요시설

▸교육장, 무왕루, 서동·선화정(2개소), 주차장 (177면), 야외공연무대(1개소), 어린이놀이터(3개소) 등

□ 추 진 실 적

◦ 공원 시설보강 공사 추진	: 2022. 4. ~ 5.

▸서동공원 어린이 놀이터 조성사업 / 70백만원

- 어린이 놀이시설 폐기물처리용역

- 어린이 조합놀이대 구입 및 설치

◦ 공원 전지 작업 등 수목관리 및 제초	: 2022. 1. ~ 12.

◦ 노후시설보수 및 시설물 유지관리	: 2022. 1. ~ 12.

□ 문  제  점

◦ 바닥분수 수중케이블 노후에 따른 작동불량 및 안전문제로 보수가 시급하나,       관련 예산이 반영되지 않아 정상가동 불가

□ 향 후 계 획

◦ 노후시설보수 및 시설물 유지관리	: 2023. 5. ~ 12.

▸서동공원내 수경시설(분수) 바닥청소 등 관리

▸산책로 야자매트, 노후 데크, 화장실, 어린이 놀이터 등 시설물 유지보수

◦ 공원 전지 작업 등 수목관리 및 제초	: 2023. 5. ~ 12.

◦ 무왕루, 서동·선화정, 조각전시품 등 시설물 관리	: 2023. 5. ~ 12.

◦ 바닥분수 수중케이블 교체공사 2024년 예산안 상정	: 2023. 11.

5. 서동농촌테마공원 관리 현황

확인자	:	녹색도시관리사업소장		김철	□
작성자	:	테마공원계장		전현영	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 240백만원

◦ 사업내용 : 서동농촌테마공원 시설보강 및 유지관리

◦ 주요시설

▸방문자센터, 생태동물체험관, 전통농촌황토초가 및 농경체험관, 유아

황토놀이터, 전통놀이마당 등

□ 추 진 실 적

◦ 공원시설 보강공사 추진	: 2022. 1. ~ 12.

▸테마공원 잔디보강 식재(3,108㎡), 경관조형물 설치(조형물 6종)

▸퍼걸러설치 4개소(정자형 2, 그네형 2), 파라솔 설치(12개소), 벤치 설치(6개소)

◦ 공원 이야기동산 꽃잔디 조성, 화단 꽃 식재 및 농경체험장 조성 : 2022. 1. ~ 10.

▸꽃잔디 관리 및 보식, 화단 꽃 식재, 농경체험장 조성(계절 채소 등)

◦ 농경체험프로그램 운영	: 2022. 4. ~ 10.

▸계절 꽃·채소 가꾸기 체험, 전통농기구, 전통놀이체험 등

□ 향 후 계 획

◦ 노후시설보수 및 시설물 유지관리	: 2023. 5. ~ 12.

▸노후 퍼걸러, 벤치 등 오일스테인 도색 작업

▸침하된 보도블럭, 파손 하수시설 보수, 노후 데크 등 시설물 유지보수

◦ 공원 이야기동산 꽃잔디 보식 및 계절꽃 화단 조성·관리	: 2023. 5. ~ 10.

◦ 서동농촌테마공원 전지 작업 등 수목관리 및 제초	: 2023. 5. ~ 12.