2023. 7.

제252회 익산시의회(임시회)

― 2023 주요업무보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	기획안전국

시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예 산 집 행 실 적
□	2023 상반기 성과 및 반성
□	2023 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 안전 및 보건에 관한 체계적인 관리시스템 구축으로 중대재해예방 재해위험 및 취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보

일   반   현   황

□ 기      구

								시민안전과
안전총괄				자연재난					중대재해				방재시설			민 방 위

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	5	6	5	5
현 원	22		1	6	7	2	6
증 감	0		-	1	1	△3	1	(시간선택제 임기제라급 1)

□ 사 무 분 장

◦ 안전총괄 : 안전관리계획 총괄, 안전문화교육, 시민안전보험, 안전신문고, 재난관리기금, 재난안전상황실, 안전관련 민관 협력계구축, 재난안전통합지원본부(사회재난), 안전한국훈련, 유‧도선사업, 승강기 관리, 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설 관련 등

◦ 자연재난 : 재난안전통합지원본부 운영(자연재난), 배수펌프장 및 배수문 유지관리, 가뭄‧한파‧폭염 종합대책, 자연재난 사전대비, 예‧경보시설, 그늘막 관리 등

◦ 중대재해 : 중대재해예방 종합계획 수립, 매뉴얼 작성·운영, 관련법령상 이행조치 관리, 산업안전보건 관리체계 구축

◦ 방재시설 : 사전재해영향성 검토, 우수저류시설 설치사업, 자연재해위험지구 정비사업, 급경사지 정비사업, 소규모 위험시설 정비사업

◦ 민 방 위 : 국가기반체계 보호 및 비상대비훈련, 충무계획, 민방위 시설·장비 관리, 통합방위협의회, 민방위 기본계획, 사회복무요원 관리

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

구 분	구 성	구 분	구 성
계	5개 72명
안전관리 위원회	15 ▸공무원 6 ▸군 인 2 ▸공 사 4 ▸기업인 3	재난관리기금 운용심의위원회	9 ▸공무원 4 ▸시의원 1 ▸전문가 2 ▸교 수 2
안전관리민관 협력위원회	18 ▸공무원 7 ▸시의원 1 ▸공 사 1 ▸교 수 1 ▸기업인 3 ▸민간인 5	재해영향평가 위원회	20 ▸공무원 3 ▸교 수 5 ▸전문가 12
산업안전보건 위원회	10 ▸공무원 5 ▸공무직 5

□ 방재시설 및 재해취약시설(지구) 현황

구 분	계	배 수 펌프장	수 문	게이트 펌 프	대규모 공사장	산사태	인명피해 우려지역
개소	105	9	11	1	9	32	43

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	19개소	-	101개소	6개소	38개소	15,425점

2023 예산집행실적

【2023. 6. 9. 현재】                                          (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
시민안전과				35,953,656	9,621,320	26,332,336	26.8
	안전총괄관리			494,853	224,083	270,770	45.3
		안전관리		331,238	195,257	135,981	58.9
			안전도시만들기	186,332	89,976	96,356	48.3
			안전도시만들기(보조)	77,400	77,400	0	100
			자율방재단운영관리	39,306	6,729	32,577	17.1
			자율방재단운영관리(보조)	10,700	6,652	4,048	62.2
			의용소방대지원	17,500	14,500	3,000	82.9
		중대재해예방		163,615	28,826	134,789	17.6
			중대재해예방	163,615	28,826	134,789	17.6
	재해 및 재난 예방			32,683,094	7,309,677	25,373,417	22.4
		인적재난 예방사업운영		133,392	43,246	90,146	32.4
			국가재난대응종합훈련	5,168	0	5,168	0	10월중 집행예정
			재난대응종합훈련	12,500	851	11,649	6.8	10월중 집행예정
			재난관리시설물안전점검	115,724	42,395	73,329	36.6
		자연재난예방사업운영		347,544	168,998	178,546	48.6
			배수장,수문유지관리	253,544	120,189	133,355	47.4
			배수장,수문유지관리지원	85,000	44,800	40,200	52.7
			풍수해보험	9,000	4,009	4,991	44.5
		재해재난대비사업운영		438,139	93,456	344,683	21.3
			재해재난예방 및 복구지원	320,969	85,468	235,501	26.6
			재해재난예방 및 복구지원(보조)	78,000	0	78,000	0	성립전예산
			재난종합상황실 운영	4,320	727	3,593	16.8
			재해재난예방	34,850	7,261	27,589	20.8

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		재해위험·취약지역정비		31,764,019	7,003,977	24,760,042	22.1
			우수저류시설 설치(보조)	3,055,217	260,439	2,794,778	8.5	명시, 사고
			재해위험지역정비(보조)	22,816,026	5,900,941	16,915,085	25.9	명시, 사고
			급경사지정비사업(보조)	5,692,917	842,597	4,850,320	14.8	명시, 사고
			전선로 지중화 사업	199,859	0	199,859	0	명시/6월말 전액집행
	민방위운영			1,032,669	420,878	611,791	40.8
		민방위대관리		1,032,669	420,878	611,791	40.8
			국민참여 민방위의 날 훈련경비	7,450	250	7,200	3.4	9월중 집행예정
			국민참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900	1,900	0	100
			을지연습운영	17,748	144	17,604	0.8	9월중 집행예정
			민방위 화생방 장비 보급	1,500	1,455	45	97.0
			민방위시설·장비 유지보수	36,350	22,779	13,571	62.7
			민방위교육훈련 및 시설장비확충	18,000	12,240	5,760	68.0
			민방위교육훈련 및 시설장비확충(보조)	9,120	5,556	3,564	60.9
			사회복무요원관리 (사회서비스분야인력경비)	877,251	333,041	544,210	38.0
			민방위교육운영비(보조)	20,232	5,250	14,982	25.9
			민방위경보사각지역해소	40,000	35,145	4,855	87.9
			민방위대피시설 비상용품확충(보조)	3,118	3,118	0	100
	재무활동			1,620,000	1,620,000	0	100
		내부거래지출		1,620,000	1,620,000	0	100
			내부거래지출	1,620,000	1,620,000	0	100
	행정운영경비			123,040	46,682	76,358	37.9
		인력운영비		91,655	33,099	58,556	36.1
			중대재해 인력운영비	91,655	33,099	58,556	36.1
		기본경비		31,385	13,583	17,802	43.3
			기본경비	31,385	13,583	17,802	43.3

2023 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 겨울철 대설·한파 대책추진 최우수 기관 선정(228개 시·군·구 중 1위)

▸행정안전부 장관 기관 표창 및 교부세 인센티브 1억원 확보

◦ 지역·현장 재난안전점검 역량강화 지원사업 선정

▸안전점검 및 재난대응장비 구입 특별교부세 1억원 확보

◦ 생활 속 안전관리로 재난 없는 도시 조성

‣익산시민 안전보험 가입	: 21개 항목 103백만원 (DB손해보험)

‣초·중·고 맞춤형 안전교육	: 17개 학교 38회 2,553명

◦ 건축공사장 추락사고 예방을 위한 안전점검 실시 : 5. 15. ~ 5. 24.

‣24개소(2개반) 점검 및 현장 시정조치 완료(5개소 : 발판 미고정 등)

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 실시로 재난 예방

▸상반기 정기안전점검(유천배수펌프장 외 18개소) 완료

◦ 재해위험·취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화

‣인화지구 우수저류시설 설치공사 추진 : 공정률 95%

‣재해위험개선지구 정비사업 추진 : 3개소(석탄, 여산, 판문)

‣급경사지 정비사업 추진 : 5개소(송천, 성당, 아리랑, 용두산, 기산)

□ 반      성

◦ 재해위험·취약지역 정비사업 지연

‣장기 계속 국비 사업으로 실시설계, 행정안전부 협의, 행정절차 등으로 예산 집행률이 저조하나, 석탄지구 등 3개 사업이 공사 발주 및 착공한 상황으로 사업이 조속히 추진될 수 있도록 만전을 기하겠음

		시민과 함께하는 안전문화 확산 안전사고 예방을 위한 안전관리 강화 자연재해 최소화를 위한 선제적 대응 재해예방 시설물 유지관리 및 보수보강 중대재해예방 및 관리체계 구축 인화지구 우수저류시설 설치공사 석탄 재해위험개선지구 정비사업 여산 재해위험개선지구 정비사업 판문 재해위험개선지구 정비사업 급경사지 정비사업 국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

2023 주요업무 추진상황

1		시민과 함께하는 안전문화 확산

□ 사 업 개 요

◦ 안전교육 및 문화 확산으로 일상생활 속 시민안전 인식 제고 필요

◦ 재난·재해 대비 및 대응역량 강화 필요

※ 2022년 사회 안전에 대한 인식률(전반적인 사회안전, 통계청) : 안전 33%, 보통 45%, 불안 22%

□ 상반기 추진실적

◦ 안전점검의 날 안전문화 캠페인 실시(4회)	: ’23. 3. ~ 6.

▸시기별⸱계절별 테마*에 맞게 매월 1회 점검 추진

* 화재 안전, 학교주변 위해요인, 행락철 안전사고, 여름철 자연재해 등

◦ 생활안전사고 예방 초‧중‧고 맞춤형 안전교육 실시	: ’23. 4. ~ 7.

▸17개 학교 38회 2,553명 (전기, 가스, 교통, 심폐소생술)

◦ 익산시 시민안전보험 확대 및 홍보	: 상시

▸보장항목 기존 15건 ⟶ 확대 21건, 읍면동 홍보물 배부 (리플릿 1,600, 배너 30)

◦ 화재 예방 및 피해주민 지원

▸화재대피용 방연마스크 54개소 비치(요양병원, 지역아동센터 등)

▸소방취약계층 주택용 소방시설(단독경보형감지기, 소화기)지원

- 466세대(기초생활수급자 300, 독거노인 119, 장애인 24, 다문화가족 23)

▸「익산시 화재피해주민 지원에 관한 조례」 피해지원금 지급 : 8명(반소 5, 부분소 3)

□ 하반기 추진계획

◦ 안전점검의 날 안전문화 캠페인 실시	: 매월 4일

◦ VR체험 등을 활용한 실습형 맞춤형 안전교육 실시	: ’23. 9.

◦ ‘23년 재난대응 안전한국훈련 실시                                  : ’23. 10. ~ 11.

▸실전과 같은 통합훈련 실시로 재난대응 역량 강화(토론⸱현장 기반)

2		안전사고 예방을 위한 안전관리 강화

□ 사 업 개 요

◦ 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전 예방 필요

◦ 생활 주변 안전관리 강화로 각종 안전 위해요소 제거 필요

□ 상반기 추진실적

◦ 2023년 안전관리계획 수립	: ’23.  2.

▸재난·안전 유형별 대책 수립 : 3개 분야 40개 유형

◦ 안전한 도시만들기를 위한 집중안전점검 및 특별점검 추진      : ’23. 1. ~ 6.

▸해빙기 시설물 안전점검 : 총 207개소(현지시정 3개소, 보수보강 8개소)

▸‘23년 집중안전점검 : 총 89개소 점검(현지시정 4개소, 보수·보강 10개소)

◦ 시설물안전관리법 대상 시설물 관리

▸제3종시설물 지정 실태조사 용역발주 (‘23년도 대상 : 총 166개소)   : ’23. 4.

▸2024년도 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 기본계획 수립   : ’23. 6.

◦ 지역축제·옥외행사 안전관리위원회 심의 및 점검 추진    : ’23. 1. ~ 6.

▸안전관리위원회 심의          : 1회(문화재야행)

▸유관기관 합동점검            : 6회(지역축제 1회, 옥외행사 5회)

◦ 재난안전통신망(협업부서 및 경찰, 소방 등 유관기관 참여) 운영 및 활용 : 상시

▸매일 1회 정기교신, 매월 2회 시나리오 훈련 및 자체교육 실시

□ 하반기 추진계획

◦ ‘23년 집중안전점검 결과 분석 및 후속조치 강화              : ‘23. 6.~12.

▸점검결과 공개, 후속조치 이행확인 등

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역 및 제3종시설물 지정·고시        : ‘23. 11.~12

◦ 지역축제·옥외행사 안전관리 및 개최현황 수시 파악     : ‘23. 6. ~ 12.

3		자연재해 최소화를 위한 선제적 대응

□ 사 업 개 요

◦ (재난대응) 여름철, 겨울철 재난상황 대응계획 수립 및 시행

▸여름철 : 사전대비  2. 20. ~  5. 14. 재해 대책기간  5. 15. ~      10. 15. (5개월)

▸겨울철 : 사전대비 10. 1. ~ 11. 14. 재해 대책기간 11. 15. ~ 익년 3. 15. (4개월)

◦ (시설보강) 자연재해 예방시설 보강사업 820백만원(도비 410, 시비 410)

▸사업대상 5건 : 경보·관측·재해예방시설 보수·보강 등

□ 상반기 추진실적

◦ 여름철 자연재난 사전대비를 위한 민·관 유관기관 간담회     : ’23. 2. 17.

▸13개 협업부서, 농어촌공사, 경찰, 소방, KT, 자율방재단 등

◦ 집중호우 대비 인명피해 우려지역(43개소) 전수점검	: ’23. 3. ~ 5.

◦ 재해예방시설(배수펌프장, 배수문 등) 점검 및 가동훈련      : ’23. 3. ~ 5.

◦ 수방자재 배부 및 사용요령 집합교육	: ’23. 4. 27.

◦ 자연재해 예방시설 보강사업 착수	: ’23. 5.

▸재난업무 담당자 수방자재 사용법 숙지 및 양수기 배부

◦ 호우특보에 따른 재난안전대책본부 운영      :  ’23. 5. 5. / 5. 28. ~ 29.

▸피해접수 내역 : 농업피해 416건(대파대 74건 / 농약대 342건)

◦ 여름철 자연재난 대비 보고회 개최(시장 주재)	: ’23. 6. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 호우·태풍 폭염 대응 추진	: ’23. 6. ~ 10.

▸재난안전대책본부 구성‧운영(13개 협업분야 15개과, 6개 유관기관)

▸폭염 T/F팀 운영, 다중이용시설 얼음·생수 비치, 노면 살수차 운행

◦ 겨울철 자연재난 대비 대응계획 수립 및 사전점검	: ’23. 10. ~ 11.

▸겨울철(대설·한파) 재난 대응/재대본 운영 :  ‘23. 11. 15  ~ 익년 3. 15.

◦ 자연재해 예방시설 보강사업 추진	: ’23. 12. 한

▸자동음성통보시스템, 강우량계 및 적설계, 배수펌프장 및 배수문 등 보강사업

4		재해예방 시설물 유지관리 보수보강

□ 사 업 개 요

계	배수 펌프장	배수문	우수 저류시설	예·경보 시스템	기상관측 장비	재대본 홈페이지	재해문자 전광판
210	9	12	3	141	42	1	2

◦ 재난예방 시설물 현황                              (단위 : 개소)

◦ 주요 추진사항

▸배수펌프장 및 배수문 정기·정밀 안전점검 용역

▸시설물 점검에 따른 결함, 노후 장비 보수·보강

▸재난 예·경보 시설 및 기상 관측장비(홈페이지) 유지관리 용역

□ 상반기 추진실적

◦ 상반기 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 시행 / 58백만원

▸유천배수문 외 18개소	: ‘23. 2. ~ 6.

◦ 재난재해예방 시설물 유지관리 용역 추진	: ‘23. 1. ~ 6.

▸예·경보시스템, 기상관측장비, 재대본 홈페이지, 재해문자전광판 등(186개소)

◦ 시설물 점검에 따른 결함, 노후장비 보수·보강 / 23백만원

▸목천소 배수펌프장 준설 및 펌프 보수	: ‘23. 3.

□ 하반기 추진계획

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 시행	: ’23. 7. ~ 9.

▸하반기 정기안전점검(10개소) 및 정밀안전점검(9개소)

◦ 재해예방 시설물 유지관리 용역 시행	: 연중

◦ 배수펌프장 및 수문 일상 보수·보강 시행	: 연중

5		중대재해예방 및 관리체계 구축

□ 사 업 개 요

◦ 중대재해예방을 위한 안전보건체계 구축으로 종사자와 시민 보호

◦ 사 업 비 : 159백만원(시비)

◦ 적용대상

▸중대산업재해 : 시 산하 전직원(약 2,800명) 및 도급·용역·위탁사업 종사자 포함

▸중대시민재해 : 공중이용시설 99개소(시설물안전리법, 실내공기질관리법 등)

◦ 주요사업

▸중대재해 컨설팅용역, 작업환경 측정, 근골격계유해요인조사, 위험성평가 등

□ 상반기 추진실적

◦ 2023년 중대재해예방 안전계획 수립	: ’23. 3. 2.

◦ 중대재해처벌법 대응 컨설팅 용역 실시	: ’23. 4. ~ 7.

◦ 안전·보건 관리 위탁	: 연  중

▸안전·보건관리자 업무 지원 및 산업보건의 업무 수행

◦ 관리감독자 정기교육 실시	: ’23. 3. ~ 5.

▸우편교육 22명, 집체+온라인교육 13명, 집체교육(8시간) 4명

◦ 상반기 중대재해예방 전직원 교육 실시	: ‘23. 5. 16.

▸강사 : 류관훈(광주지방고용노동청 광역중대재해수사과장)

◦ 상반기 작업환경측정 용역 실시	: ’23. 5. ~ 7.

◦ 근골격계 유해요인조사 용역 실시	: ’23. 3. ~ 5.

◦ 사업장 순회점검(33개소)	: 연  중

◦ 위험성평가 용역 실시	: ’23. 6. ~ 8.

◦ 산업안전보건위원회 개최(1분기, 2분기)	: 2회

□ 하반기 추진계획

◦ 하반기 작업환경측정 용역 실시	: ’23. 10. ~ 11.

◦ 하반기 중대재해예방 전직원교육 실시	: ~‘23. 11.

▸법령의 이해도 제고 및 안전 역량 강화(BSC평가)

◦ 중대재해예방 의무이행사항 점검	: 반기별

6		인화지구 우수저류시설 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 주현동 203번지(1지구), 동산동 1048번지(2지구)

◦ 사업규모 : 우수저류시설 설치 18,920㎥(인화1 : 8,570㎥, 인화2 : 10,350㎥)

◦ 총사업비 : 24,205백만원(국비 11,500, 도비 3,450, 시비 9,255)

▸기투자 : 23,000백만원(국비 11,500, 도비 3,450 시비 8,050)

▸‘23년도 :  1,205백만원(시비 1,205)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년(6개년)

□ 상반기 추진실적

◦ 도시관리계획(마동지구단위계획) 결정(변경)	: ’19. 12.

◦ 공사 착공	: ’20.  4.

◦ 우수저류시설 설치공사 추진(공정률 95%)	: ’23.  6.

▸1지구 : 저류조·건축·기계, 유입관로 공사 완료, 전기·유출관로·주차장 공사 중

▸2지구 : 저류조·건축·기계, 유출입관로 공사 완료, 전기·공원 공사 중

□ 하반기 추진계획

◦ 우수저류시설 시운전	: ’23. 7.

◦ 부대시설 설치 및 준공	: ’23. 9.

▸1지구 : 상부 주차장 조성(주차대수 58대)

▸2지구 : 상부 어린이공원 조성(2,848㎡), 지중화 구간 포장 복구

◦ 전선로 지중화 사업	: ’23. 9.

▸배전선로 지중화 L=250m(한전주 및 통신주)

7		석탄 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 석탄동 1016-91번지 일원

◦ 사업규모 : 펌프장 증설(1개소 Q=23.5㎥/s→ 2개소 56.5㎥/s, 펌프 8대 30㎥/s 증), 관로개선 L=358m

◦ 총사업비 : 29,165백만원(균특 5,132, 국비 9,450, 도비 5,833, 시비 8,750)

▸기투자 : 18,900백만원(균특     0, 국비 9,450, 도비 3,780, 시비 5,670)

▸2023년 : 2,000백만원(균특 1,000, 국비    0, 도비  400, 시비  600)

▸2024년이후 : 8,265백만원(균특 4,132, 국비 0, 도비 1,653, 시비 2,480)

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)

□ 상반기 추진실적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2019-93호)	: ’19.  9.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’20.  5.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: ’22.  7.

◦ 기술자문위원회 심의(익산시 감사위원회)	: ’22.  8.

◦ 계약심의위원회 심의(익산시 회계과)	: ’22. 10.

◦ 공사 착공	: ’22. 12.

◦ 계속 공사 추진(공정율 15%)	: ’23.  6.

▸토목(펌프장) 구간 터파기 중

□ 하반기 추진계획

◦  계속 공사 추진	: ’23.  7.

▸토목(펌프장), 건축(기계실), 기계(펌프), 전기(배전반)

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

8		여산 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 여산리 412-4번지 일원

◦ 사업규모 : 배수로 신설 L=350m, 우수관로 정비 L=4,800m, 펌프장 Q=21.0㎥/min 및 저류지 1개소(V=3,400㎥) 설치, 강경천·닭작골천·유성천 정비

◦ 총사업비 : 38,000백만원(균특 18,000, 국비 1,000, 도비 7,600, 시비 11,400)

▸기투자 :  2,000백만원(균특     0, 국비 1,000, 도비   400, 시비   600)

▸2023년 :  3,000백만원(균특 1,500, 국비    0, 도비   600, 시비  900)

▸2024년이후 : 33,000백만원(균특 16,500, 국비 0, 도비 6,600, 시비 9,900)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5개년)

□ 상반기 추진실적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호)	: ’20.  8.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’21. 12.

◦ 제1차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’22.  2.

◦ 제2차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’22.  3.

◦ 기본설계 사전설계검토(행정안전부)	: ’22. 12.

◦ 도지정문화재 현상변경(여산숲정이순교성지외 4개)	: ’23.  5.

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계 사전설계검토 심의(행정안전부)	: ’23.  7.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사발주	: ’23.  9.

◦ 공사 착공	: ’23. 11.

◦ 공사 준공	: ’25. 12.

9		판문 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 춘포면 용연리 529-5번지 일원

◦ 사업규모 : 수로정비 L=411m, 암거교(5.0x1.5) 4개소, 우수관로정비L=534m

◦ 총사업비 : 4,400백만원(균특 610, 국비 1,590, 도비 880, 시비 1,230)

▸기투자 : 3,180백만원(균특   0, 국비 1,590, 도비 636, 시비   954)

▸2023년 :   820백만원(균특 410, 국비     0, 도비 164, 시비   246)

▸2024년이후 : 400백만원(균특 200, 국비  0, 도비  80, 시비   120)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4개년)

□ 상반기 추진실적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호)	: ’20.  8.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’21.  6.

◦ 사전설계검토 심의(전라북도)	: ’22.  7.

◦ 공사원가심사(전라북도)	: ’22.  8.

◦ 공사 착공	: ’22. 10.

◦ 계속 공사 추진(공정률 15%)	: ’23.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 계속 공사 추진	: 계속

▸수로정비, 저류지설치, 암거교설치 공사

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

10		급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 송천지구, 성당지구, 아리랑지구, 용두산지구, 기산지구

◦ 사업규모 : 사면정비 5개소(A=17,920㎡)

◦ 총사업비 : 17,418백만원(국 8,709, 도 3,484, 시 5,225)

사 업 명	총사업비(백만원)				사업기간
	소 계	기투자	2023년	2024년이후
총 계	17,418	6,060	2,758	8,600
송천지구	1,800	1,800	-	-	‘20년~’23년
성당지구	1,500	1,500	-	-	‘20년~’23년
아리랑지구	3,518	2,260	1,258	-	‘21년~’24년
용두산지구	10,000	500	1,400	8,100	‘22년~’25년
기산지구	600	-	100	500	‘23년~’25년

□ 상반기 추진실적

◦ 송천지구, 성당지구, 아리랑지구 급경사지 정비사업 공사 추진

▸공사 착공/공정율(송천 ‘21.10월/70%, 성당 ’21.11월/70%, 아리랑 ‘22.8월/30%

◦ 용두산지구, 기산지구 급경사지 정비사업 실시설계용역 추진

▸용두산지구 : 실시설계용역 착수(’22.4월), 실시설계 사전설계검토 행정안전부심의(‘23.4월)

▸기산지구 : 실시설계용역 착수(’23.2월)

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계용역 완료 및 공사 발주(용두산지구)	: 2023. 07.

◦ 실시설계용역 완료 및 공사 발주(기산지구)	: 2023. 08.

◦ 계속공사 추진 및 준공(송천지구, 성당지구)	: 2023.	12.

◦ 계속공사 추진 및 준공(아리랑지구)	: 2024. 12.

11		국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

□ 사 업 개 요

◦ 추진방향 : 비상대비‧민방위 분야 대응태세 확립으로 시민의 생명과 재산보호

◦ 주요내용

▸비상대비 분야  : 비상대비 을지연습 실시, 통합방위협의회 개최

▸민 방 위 분야  : 민방위대 편성 및 교육, 민방위 시설·장비 확충 및 관리

* 민방위대원 13,280명 (2023. 6. 9.기준) : 1-4년차 5,707명, 5년차 이상 7,573명

* 민방위 시설‧장비 164개소 : 경보시설 19, 대피시설 101, 급수시설 44

□ 상반기 추진실적

◦ 비상대비 훈련

▸제9585부대 혹한기 훈련에 따른 통합방위지원본부 운영 : 2023.2.10

- 통합방위정보공유 체계를 활용한 메시지 처리 및 상황유지

◦ 민방위 편성 및 교육

▸민방위대원 편성(2023. 1. 10.기준)           :  13,589명

- 1~4년차 대원 5,970명, 5년차 이상 대원 7,619명

▸민방위 기본교육(집합,사이버)/ 8,006명  : 2023. 4. 3. ~ 6. 18.

◦ 민방위 경보시설 신규 구축  : 1개소(왕궁면 행정복지센터 옥상)

◦ 민방위 비상급수시설 관정 사후관리 실시 : 5개소(영등시민공원 외)

◦ 민방위 비상급수시설 음수기 교체                 : 영등시민공원

◦ 민방위 장비 확충

▸비상대피시설 구급함 교체                     : 81개소

▸민방위 기술지원대 화생방 장비 구입 : 탐지지 1개, 제독용액 9통

▸비상대피시설 비상용품함 구입             : 6개

□ 하반기 추진계획

◦ 2023년 을지연습 실시                            : 2023. 8.21~8.24.

◦ 민방위 비상대피훈련 및 마을 소집단 훈련 실시    : 2023. 8.~11.

◦ 민방위 훈련 및 민방위 사이버교육(보충교육) 추진  : 2023. 9.~12.