2023.  7.

제252회 익산시의회(임시회)

‐ 2023 주요업무 보고 ‐

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

도시개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 상반기 성과 및 반성
□	2023 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
사람이 머무르고 살고 싶은 익산건설을 위한 시민 모두가 다이로운 도시개발 및 관리

		전 략 목 표
◦	미래지향적인 도시계획·도시재생전략계획 수립
◦	인간과 환경을 중시하는 도시개발
◦	다양성이 조화로운 매력적인 도시이미지 창출

		중 점 과 제
◦	지속가능한 도시계획 및 개발로 특색있고 균형있는 지역발전 수립
◦	시민 체감 도로망 확충으로 안전하고 편리한 교통서비스 제공
◦	자연, 역사, 문화가 어울리는 체계적인 도시경관 형성 및 관리
◦	원도심재생을 통한 생활환경개선 및 지역활성화

일   반   현   황

□ 기        구

							도시개발과
도시행정			도시경관			도시계획					도시개발				도시재생					재생시설

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	27	1	1	6	7	5	7
현 원	28	1	1	8	8	5	5
증 감	1	-	-	2	1	-	△2

□ 사 무 분 장

	◦	도시행정	:	국소관 행정 종합기획·조정, 전문건설업 등록 및 관리 개발행위(변경)허가, 불법개발행위 지도단속
	◦	도시경관	:	익산시 도시경관 총괄계획 수립, 익산시 야간경관 명소화사업, 경관위원회 및 공공디자인 위원회 운영(심의·자문·협의)
	◦	도시계획	:	도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정, 장기미집행 도시계획 시설관리
	◦	도시개발	:	도시계획 도로개설 사업 시행, 토지수용 재결, 소유권이전 촉탁, 기타 과 보상관련 업무전반
	◦	도시재생	:	도시재생 종합기획조정, 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립, 도시재생 뉴딜사업 국가공모사업 추진, 소규모 재생사업 공모 및 추진, 도시재생지원센터 운영, 새뜰마을 사업 추진(모현동 옥창지구, 평화동 평화지구) 도시재생 뉴딜사업 추진(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈, 다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열(咸悅))
	◦	재생시설	:	도시재생 뉴딜사업 추진(역사가 문화로, 푸른솔 세대통합 행복마을, 도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중, 이천년 고도의 새로운 숨결·다시 숨쉬는 금마), 도시재생현장지원 센터 운영

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.926	76.089	216.735	192.181	21.921
비 율	100	15.0	42.7	38.0	4.3

□ 도시지역 내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.089	17.904	1.889	10.779	45.517
비 율	100	23.5	2.5	14.2	59.8

□ 도시지역 내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관 지구	고도 지구	방화 지구	보호지구 (역사문화 환경 보호지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	개발 진흥 지구	비고
지구수	181	32	6	10	1	90	43
면 적	27,264	15,049	941	1,300	202	3,148	6,653

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡, %)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설		집행률
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	(%)
총 계		1,915	29,791,250	1,896	29,489,124	19	302,126	99.0
도로	소 계	1,345	11,699,601	1,331	11,572,784	14	126,817	98.9
	광 로	6	1,180,130	5	1,160,250	1	19,880	98.3
	대 로	62	3,791,520	59	3,752,348	3	39,172	98.9
	중 로	329	4,392,050	327	4,341,663	2	50,417	98.8
	소 로	947	2,335,279	939	2,317,931	8	17,348	99.0
공원	소 계	103	4,745,169	100	4,576,138	3	169,031	96.4
	근린공원	45	4,266,121	44	4,128,305	1	137,816	96.8
	역사공원	2	76,461	1	64,792	1	11,669	84.7
	수변공원	2	28,058	1	8,512	1	19,546	30.3
	어린이공원	39	90,055	39	90,055	0	0	100
	소공원	13	48,892	13	48,892	0	0	100
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	100
	묘지공원	1	200,303	1	200,303	0	0	100
녹지	소 계	97	622,004	95	615,726	2	6,278	99.0
	완충녹지	78	561,556	76	555,278	2	6,278	98.9
	경관녹지	15	54,686	15	54,686	0	0	100
	연결녹지	4	5,762	4	5,762	0	0	100
기타	소 계	371	12,725,098	371	12,725,098	0	0	100
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	100
	광 장	30	660,484	30	660,484	0	0	100
	공공청사	15	196,097	15	196,097	0	0	100
	유원지	0	0	0	0	0	0	0
	운동장	1	260,000	1	260,000	0	0	100
	기 타	276	11,459,484	276	11,459,484	0	0	100

□ 도시재생활성화지역 지정 현황

권역	지역명		면적(㎡)	유형	지역특성	비고
A. 원도심 역세권 재생권역	1	역사가(驛史街) 문화로(文化路)	185,007	근린재생형	원도심/전통시장/근대역사
	2	익산 KTX역 동편 원도심	1,200,000	근린재생형	원도심/전통시장/근대역사
	3	익산 KTX역 서편	613,000	근린재생형 (도시경제 기반형 가미)	KTX역/서부역사진입로
	4	송학동	423,000	근린재생형	개별아파트입지/변전소
	5	남부지구	906,000	근린재생형	버스터미널/준공업지역/위락시설
	6	동산동	483,000	근린재생형	단군성묘/동산새뜰마을
	7	인화마동	1,173,000	근린재생형	전통시장/하이트공장
	8	동부시장	1,379,000	근린재생형	동부시장/주공A/ 구획정리사업지구
	9	남중동	1,079,000	근린재생형	익산시청/모현우남A/ 행정업무시설
	10	모현동	1,046,000	근린재생형	노후아파트(모현우남A)/원광여중고
	11	신동	842,000	근린재생형	대학로/ 구획정리사업지구
	12	남부시장	115,000	근린재생형	근대역사/전통시장
	13	신청사	162,000	근린재생형	익산시청/여성회관/ 올림픽기념관
	14	팔봉동	588,000	근린재생형	준공업지역/이리신흥초
B. 역사문화 재생권역	1	금마고도	1,095,000	근린재생형	고도지구/유네스코세계유산
C. 농촌중심지 재생권역	1	함열	1,484,000	근린재생형	전통시장/읍소재지/공공기관

2023 예산집행실적

【 2023. 6. 9. 현재 】                                    (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔액	비 율	비고
도시개발과				48,705,695	9,794,155	38,911,540	20.1
소계(일반회계)				48,588,032	9,794,155	38,793,877	20.2
	도시개발관리			11,179,090	4,634,842	6,544,248	41.5
		도시계획		906,435	303,922	602,513	33.5
			도시계획관리	503,435	114,562	388,873	22.8	사고이월 190,375
			익산시 성장관리계획 수립	403,000	189,360	213,640	47.0
		도시경관디자인 조성		1,427,044	9,074	1,417,970	0.6
			도시디자인	166,500	3,788	162,712	2.3	명시이월 71,500
			도시경관 개선사업	53,900	3,900	50,000	7.2
			도시경관	118,200	1,386	116,814	1.2	명시이월 116,800
			야간경관 명소화 사업(전환사업)	1,088,444	0	1,088,444	0	명시이월 1,088,444
		도시계획도로개설(대로)		2,202,573	1,716,802	485,771	77.9
			목천동원주@~우석 장례예식장간 도로확장	702,573	216,802	485,771	30.9	명시568,698 사고133,875
			도·농 연결도로개설	1,500,000	1,500,000	0	100
		도시계획도로개설(중로)		1,377,648	41,425	1,336,223	3.0
			황등 중로(2차) 도로개설	131,872	22,527	109,345	17.1	명시이월 131,872
			황등 진성아파트~ 진성카센터간 인도 개설	199,881	13,995	185,886	7.0	명시이월 199,881
			신흥동(용연~신흥) 도시계획 도로개설	26,353	0	26,353	0	사고이월 26,353
			영등동 골든캐슬 옆 도로개설	1,019,542	4,903	1,014,639	0.5	명시이월 19,542
		도시계획도로개설(소로)		1,875,564	1,309,405	566,159	69.8
			함열 농협 옆 도로개설	16,669	16,329	340	98.0
			미불용지 보상	200,000	58,228	141,772	29.1
			모현동 배산로24길 (소로3류15호) 도로개설	400,000	213,357	186,643	53.3
			함열 미력리(소로 1류7호, 소로2류39호) 도로개설공사	206,635	84,416	122,219	40.9
			용안면 상신마을 도로확포장	60,000	59,998	2	100
			영등동 비전교회 옆 소로2류312호 도로개설	112,260	111,677	583	99.5
			금마초등학교 앞(소로3류809호) 도로개설	180,000	137,497	42,503	76.4
			팔봉 기안2차아파트(소로2류641호) 도로개설	400,000	400,000	0	100
			송학초등학교 통학로(인도) 개설 공사	300,000	227,903	72,097	76.0
		신규 도시개발 사업		3,389,826	1,254,214	2,135,612	37.0
			송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호) 도로개설	2,191,790	1,143,347	1,048,443	52.2	명시이월 1,189,790
			함열 십장생~함열 농공단지간 도로개설	150,000	44,500	105,500	29.7
			익산대로 10길(대로3류26호)도로확포장	1,048,036	66,367	981,669	6.3	명시이월 48,036
	도시재생관리			36,443,896	4,809,506	31,634,390	13.2
		도시재생		36,443,896	4,828,506	31,615,390	13.2
			도시재생사업	235,583	23,677	211,906	10.1	사고이월 16,443
			도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	47,641	10,161	37,480	21.3
			도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	3,042,982	584,011	2,458,971	19.2	명시594,711 사고279,912 계속비1,499,238
			도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)	9,614,288	1,464,236	8,150,052	15.2	명시3,417,669 사고1,504,077
			도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	6,577,639	541,482	6,036,157	8.2	명시2,305,957 사고101,140
			도시재생 뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)	10,905,167	379,542	10,525,625	3.5	명시2,065,710 사고560,915
			도시재생 뉴딜사업 (이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	2,290,162	228,697	2,061,465	10.0	명시이월 844,620
			모현동 옥창지구 새뜰마을 사업	873,448	446,316	427,132	51.1	명시818,531 사고54,917
			평화지구 새뜰마을 사업	1,556,986	517,363	1,039,623	33.2	명시이월 246,286
			뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고 싶은 삶터 남중동) (시비)	1,300,000	614,021	685,979	47.2
	행정운영경비			39,918	21,055	18,863	52.7
		기본경비		39,918	21,055	18,863	52.7
			기본경비	39,918	21,055	18,863	52.7
	행정운영경비			925,128	328,752	596,376	35.5
		인력운영비		925,128	328,752	596,376	35.5
			인력운영비	154,458	55,870	98,588	36.2
			도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)	152,838	67,278	85,560	44.0
			도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)	154,458	52,609	101,849	34.1
			도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)	154,458	64,256	90,202	41.6
			도시재생 뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)	154,458	36,002	118,456	23.3
			도시재생 뉴딜사업 (이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)	154,458	52,737	101,721	34.1
소계(특별회계)				117,663	0	117,663	0
특별회계				117,663	0	117,663	0
		장기미집행 도시계획시설 대지보상		117,663	0	117,663	0

2023 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 성장관리계획 구역 지정으로 난개발 방지와 체계적인 구역 관리 추진

▸익산시 성장관리계획 수립 용역(2023. 3. ~ 2024. 1.) 착수

◦ 쾌적한 경관 조성 및 도시이미지 개선을 위한 경관·공공디자인 행정체계 구축

▸경관계획 재정비, 야간경관계획 및 제2차 공공디자인 진흥계획 수립 용역

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

▸송학동 티스테이션~평동로간 도로개설공사 착공	: L=250m, B=6m

▸모현동 배산로24길(소로3류15호) 도로개설공사 착공	: L=210m, B=6m

▸영등동 비전교회 옆 소로2류312호 도로개설공사 준공	: 2023. 1.

▸용안면 상신마을 도로확포장공사 준공	: 2023. 5.

▸함열 미력리(소로2류39호) 도로개설공사 준공	: 2023. 6.

◦ 2023 도시혁신 산업박람회 유치

▸도시혁신 산업박람회 익산시 최종 개최지 선정	: 2023. 4. 25.

▸도시혁신 산업박람회 추진단 T/F팀 구성	: 2023. 5. 15.

◦ 도시재생 뉴딜사업으로 원도심 지역 활성화에 기여

▸인화동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 솜리문화공방 조성공사 추진, 근대문화체험 및 근대복지공간 설계용역 추진

▸중앙동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 중매서 커뮤니티라운지 인테리어 준공, 음식·식품 교육문화원 인테리어공사 추진

▸송학동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 푸른솔커뮤니티센터 건립공사 추진, 집수리 정비사업 추진

▸남중동 도시재생 뉴딜사업 추진

- 상생협력상가 및 상생마당 조성공사 추진, 집수리 지원사업 추진

▸금마면 도시재생 뉴딜사업 추진

- 금마공감터 조성 부지매입 완료, 금마공감터 및 선화다실 조성 설계 추진

□ 반      성

◦ 도시재생 사업 중 일부 거점시설의 편입토지 매입절차 진행중에 따른 사업추진 지연

▸토지 소유주와의 지속적인 협의를 통한 조속한 토지 매입 및 사업 추진

2023 주요업무 추진상황

		익산시 성장관리계획 수립 용역
		익산시 경관계획 재정비 용역
		익산시 야간경관 명소화 사업
		익산 공업지역 기본계획 수립용역
		익산대로10길(대로3류26호) 도로확포장
		송학동 티스테이션~평동로간 (대로3류21호) 도로개설

		도시재생 뉴딜사업 (다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열(咸悅))
		평화동 평화지구 새뜰마을사업
		도시재생 뉴딜사업 (독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)
		도시재생 뉴딜사업 (역사가 문화로)
		도시재생 뉴딜사업 (푸른솔 세대통합 행복마을)
		도시재생 뉴딜사업 (도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)
		도시재생 뉴딜사업 (이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)

1		익산시 성장관리계획 수립 용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 1.

◦ 사업규모 : 성장관리계획 1식

◦ 총사업비 : 316백만원

◦ 주요내용

▸성장관리계획 구역 설정

▸성장관리계획 수립

□ 상반기 추진실적

◦ 성장관리계획 수립 용역 착수	: 2023. 3. 24.

▸기간 : 2023. 3. 24. ~ 2024. 1. 17.

◦ 착수보고회 개최	: 2023. 4. 11.

◦ 기초조사 및 현황분석	: 2023. 4.~ 6.

▸개발가능지, 개발압력, 지가변동, 인구증감 분석 등

◦ 관련(기관)부서 워크숍 및 협의	: 2023. 6. 29.

□ 하반기 추진계획

◦ 성장관리계획구역 지정(안) 수립	: 2023. 7.~ 8.

▸현장조사 및 여건분석, 기본구상 등

◦ 성장관리계획(안) 수립	: 2023. 9.~10.

▸기반시설, 건축물 용도, 규모, 형태, 색채 등

◦ 주민공람 및 의회의견청취	: 2023. 10.~11.

◦ 도시계획위원회 심의	: 2023. 11.

◦ 성장관리계획구역 지정 및 계획 결정고시	: 2023. 12.

◦ 성과품 작성 및 용역 준공	: 2024.  1.

2		익산시 경관계획 재정비 용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년

◦ 사업규모 : 익산시 전역(506.925㎢)

◦ 사 업 비 : 222백만원

◦ 주요내용 : 기정 경관계획의 타당성 재검토 및 정비

▸경관자원 현황 조사 및 분석(기정 경관계획 및 관련계획 분석)

▸경관구조, 중점경관관리구역, 경관지구 등 경관계획 재검토

▸경관 가이드라인(설계지침) 정비, 경관사업 발굴 및 실행계획 수립

▸경관계획 재정비 용역 착수 : 2022.  5.

※ 도급자  : 유한회사 두다 / ㈜명신기업

□ 상반기 추진실적

◦ 경관계획 재정비 용역 중간보고회(1차, 2차)	: 2023. 1.~ 3.

◦ 경관계획 재정비(안) 수립	: 2023. 4.

◦ 공청회 개최 및 시의회 의견청취	: 2023. 5.~ 6.

◦ 관계 기관(부서) 협의	: 2023. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 경관위원회 심의	: 2023. 7.

◦ 최종보고회 및 용역 완료(경관계획 확정 공고)	: 2023. 8.

3		익산시 야간경관 명소화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

◦ 총사업비 : 1,200백만원 (도비 600, 시비 600)

◦ 주요내용

▸익산시 야간경관 명소화계획 수립 용역 (200백만원)

- 익산시 야간경관계획 및 가이드라인 수립

- 익산시 야간경관 10대 명소 발굴 및 시범사업 1개소 실시설계

- 용역 착수 : 2022. 6. (도급자 : 나남에이엘디㈜ / ㈜누리플랜)

▸야간경관 명소화 시범사업 추진 (1,000백만원)

□ 상반기 추진실적

◦ 야간경관 명소화 계획 수립 용역 중간보고회	: 2023. 1.

◦ 야간경관계획(가이드라인) 및 10대 명소 기본계획 수립	: 2023. 2.

▸야간경관 명소화 시범사업 대상지 선정 : 익산역 광장

◦ 야간경관 명소화 시범사업(익산역광장) 실시설계	: 2023. 3.~

▸대상지 현황조사 및 디자인 구상, 관련 기관 및 부서 협의 실시 등

▸도 공공디자인 심의, 원가심사, 시 경관위원회 심의 등 행정절차 이행

□ 하반기 추진계획

◦ 익산시 야간경관 명소화 계획 수립 용역 완료	: 2023.  8.

◦ 야간경관 명소화 시범사업 발주 및 착공	: 2023. 10.

◦ 야간경관 명소화 시범사업 준공	: 2024.  4.

4		익산 공업지역 기본계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 7.

◦ 사 업 비 : 175백만원

◦ 대 상 지 : 익산시 공업지역 전반/1.13㎢

◦ 주요내용

▸공업지역의 여건, 현황분석 및 공업지역의 종합발전계획 진단․평가 및 개선방향 등 종합계획

▸산업의 고도화 및 혁신, 지역산업 보호․육성 등 공업지역 관리 및활성화의 기본방향 제시

▸인구특성, 토지이용 특성 및 주변환경 등을 종합적으로 고려하여 지역에 특화된 사항을 중심으로 계획내용 반영

□ 상반기 추진실적

◦ 익산시 공업지역 기본계획 수립용역 착수	: 2023. 3.

◦ 기초조사 및 대상지 현황분석	: 2023. 3.~ 7.

▸공업지역 현황조사(공장운영업체별 면적, 업종, 종업원수 등)

□ 하반기 추진계획

◦ 익산 공업지역 기본계획(안) 수립	: 2023.  8.~ 10.

◦ 주민의견청취(공청회)	: 2023. 10.~ 11.

◦ 의회의견청취	: 2023. 11.~ 2024. 1.

◦ 전략환경영향평가	: 2023.  9.~ 2024. 3.

◦ 관계행정기관 협의	: 2024.  1.~ 5.

◦ 도시계획위원회 심의	: 2024.  6.

◦ 확정 및 공고	: 2024.  7.

5		익산대로10길(대로3류26호) 도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019 ∼ 2024년

◦ 위    치 : 익산시 인화동 1가 1-18번지 ~ 79-10번지 일원

◦ 사업내용 : 도로확포장 L=215m, B=6m→25m(대로3류26호)

◦ 총사업비 : 11,310백만원(공사비 3,310 보상비 8,000)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2022년 까지	2023년	2024년
총 계	11,310	6,508	1,048	3,754
시 비	11,310	6,508	1,048	3,754

▸2023년 예산 : 1,048백만원(본예산 1,000백만원+명시 48백만원)

▸보 상 현 황 : 전체 3,865㎡ 중 3,535.9㎡ 협의 완료(92%)

□ 상반기 추진실적

◦ 토지보상 협의 추진	: 2023. 1.~ 5.

▸총 5필지 329.1㎡

▸부진사유 : 보상가격 불만족 및 토지주 사망

◦ 토지수용재결 신청	: 2023. 5. 22.

□ 하반기 추진계획

◦ 토지수용재결(열람공고, 공탁, 소유권이전)	: 2023. 12.한

▸총 5필지 329.1㎡

6		송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호) 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019 ∼ 2024년

◦ 위    치 : 송학동 127-18번지 ~ 송학동 224-138번지 일원

◦ 사업내용 : 도시계획 도로개설 L=300m, B=25m(대로3류21호)

◦ 총사업비 : 6,360백만원(공사비 3,249 보상비 3,111)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2022년 까지	2023년	2023년 추경
총 계	6,360	2,911	2,191	1,258
시 비	6,360	2,911	2,191	1,258

▸2023년 예산 : 2,191백만원(본예산 1,002백만원+명시 1,189백만원)

□ 상반기 추진실적

◦ 설계심의 및 계약심사	: 2023. 1.~ 4.

◦ 공사착수(1차분)	: 2023. 5. 30.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사추진(1차분)	: ~ 2023. 12.

7		도시재생 뉴딜사업(다함께 즐거운 순환경제 특화도시 함열(咸悅))

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 함열읍 와리 545-18번지 일원(함열시장 일원)

◦ 면    적 : 185,000㎡

◦ 사업유형 : 지역특화재생형

◦ 사업내용 : 순환경제활력센터 조성, 청년그린창업플랫폼 조성, 상권가로
조성, 스마트 함열생활인프라 구축, 민간 역량 활성화 지원 등

◦ 총사업비 : 21,950백만원(국비 12,000 도비 2,000 시비 7,950)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
총계	21,950	2,700	5,300	10,500	3,450
국비	12,000	1,500	3,000	5,700	1,800
도비	2,000	250	500	950	300
시비	7,950	950	1,800	3,850	1,350

□ 상반기 추진실적

◦ 함열지역 도시재생사업 거점시설 활용방안 연구용역 발주	: 2023. 3.

◦ 익산 함열지역 도시재생활성화계획(안) 승인 신청	: 2023. 5.

(익산시 → 전북도)

◦ 전북도 도시재생위원회 안건 심의	: 2023. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 부지 협의매입 추진	: 2023.  7.~

▸청년 그린창업 플랫폼

◦ 주요 단위사업 설계 및 사업 추진	: 2023.  8.~

▸순환경제활력센터, 청년 그린창업 플랫폼, 상권가로환경 등

◦ 민간역량활성화지원사업 추진	: 2023. 10.~

▸도시재생대학 운영, 마을안전관리단 구성 등

8		평화동 평화지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 평화동 33-19번지 일원

◦ 면    적 : 77,100㎡

◦ 사업내용 : 안전확보, 주택정비, 인프라정비, 복지 및 휴먼케어 등

◦ 총사업비 : 4,134백만원(국비 2,894 도비 372 시비 868)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	4,134	829	675	1,320	1,310
국비	2,894	580	472	924	918
도비	372	75	61	119	117
시비	868	174	142	277	275

□ 상반기 추진실적

◦ 도시가스 공급사업을 위한 행정절차 진행(도로굴착심의 등)	: 2023. 3.

◦ CCTV 설치공사 완료(신규 10개소, 교체 1개소)	: 2023. 5.

◦ 노후골목길정비공사 부지 매입	: 2023. 3.

◦ 노후골목길정비공사 실시설계 착수	: 2023. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 주요 단위사업 지속추진	: 2022. 7.~12.

▸노후골목길정비공사, 주택정비지원, 도시가스, 주민역량강화 및 휴먼케어용역 추진 등

9		도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 인화동1가 119번지 일원(인화동 남부시장지역)

◦ 면    적 : 114,500㎡

◦ 사업유형 : 일반근린형

◦ 사업내용 : 근대문화체험 및 주민복지공간 조성, 솜리 문화공방 조성, 상생협력상가 및 상생마당 조성, 4.4만세운동기념길 및 광장정비, 노후주거지 환경 개선, 공동체 회복을 위한 거버넌스 구축 등

◦ 총사업비 : 14,200백만원(국비 8,500 도비 1,417 시비 4,283)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	14,200	2,975	3,500	3,400	4,325
국비	8,500	1,785	2,100	2,040	2,575
도비	1,417	297	350	340	430
시비	4,283	893	1,050	1,020	1,320

□ 상반기 추진실적

◦ 근대문화체험 및 주민복지공간・근대역사의숲 설계용역 추진 : 2023. 1.~

◦ 솜리 문화공방 조성(리모델링) 설계용역 완료	: 2023. 1.

◦ 솜리 문화공방 조성(리모델링) 공사 착공 및 추진	: 2023. 2.~

◦ 도시재생 집수리 지원사업 추진(15호)	: 2023. 1.~6.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 추진	: 2023. 1.~

▸사드락사드락축제 운영, 목공·염색창업 교육 및 체험 등

□ 하반기 추진계획

◦ 근대문화체험 및 주민복지공간・근대역사의숲 설계용역 완료 : 2023. 8.

◦ 솜리 문화공방 조성(리모델링) 공사 준공              : 2023. 8.

◦ 근대문화체험 및 주민복지공간・근대역사의숲 조성 공사 추진 : 2023. 9.~

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 지속 추진 : 2023. 7.~12.

▸솜리 주민공모사업, 마을해설사 양성교육 등

10		도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년(6년)

◦ 위    치 : 익산시 중앙동1가 24번지 일원(원도심 지역)

◦ 면    적 : 185,007㎡

◦ 사업유형 : 중심시가지형

◦ 사업내용 : 익산 사회․경제 어울림센터 조성, 익산 푸드 문화메카 조성, 중․매․서 커뮤니티라운지 조성, ‘삼산’기억명소화 프로젝트, 익산역 프롬나드 조성, 세대공감 커뮤니티센터 조성, 익산 도시재생 거버넌스 구축

◦ 총사업비 : 25,000백만원(국비 15,000 도비 2,500 시비 7,500)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
총계	25,000	7,250	7,850	3,650	5,000	1,250
국비	15,000	4,350	4,710	2,190	3,000	750
도비	2,500	725	785	365	500	125
시비	7,500	2,175	2,355	1,095	1,500	375

□ 상반기 추진실적

◦ 중매서 커뮤니티라운지 인테리어공사 준공	: 2023. 2.

◦ 음식·식품 교육문화원 1층 인테리어 설계완료 및 공사착공: 2023. 6.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 추진	: 2023. 1.~

▸문화예술축제「중앙□인화 근대를 잇다」,「중앙 팝 페스티벌」운영 등

□ 하반기 추진계획

◦ 음식·식품 교육문화원 1층 인테리어 공사준공	: 2023. 7.

◦ 문화주차장 2공구 철거 및 조성공사 시행	: 2023. 8.~10.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 지속 추진	: 2023. 7.~12.

11		도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-10번지 일원(KTX익산역 서편지역)

◦ 면    적 : 193,000㎡

◦ 사업유형 : 일반근린형

◦ 사업내용 : 푸른솔커뮤니티센터, 커뮤니티가든 조성, 공동체 일자리 플랫폼, 자원순환형 공동체텃밭, 도시재생리빙랩스테이션, 도시재생거버넌스 운영, 공공리모델링 임대주택(45호), 행복주택(80호) 공급 등

◦ 총사업비 : 16,670백만원(국비 10,000 도비 1,666 시비 5,004)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	16,670	3,500	4,466	3,757	4,947
국비	10,000	2,100	2,680	2,254	2,966
도비	1,666	350	446	376	494
시비	5,004	1,050	1,340	1,127	1,487

□ 상반기 추진실적

◦ 푸른솔 커뮤니티센터 건립공사 추진	: 2023. 1.~ 6.

◦ 도시재생리빙랩스테이션 설계용역 추진	: 2023. 1.~ 6.

◦ 도시재생 집수리 지원사업 추진(50호)	: 2023. 3.~ 6.

◦ 도시재생활성화계획 변경 추진완료	: 2023. 6.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 추진	: 2023. 1.~

▸주민리더양성교육(환경교육지도사), 도시농업관리사 양성과정 등

□ 하반기 추진계획

◦ 도시재생리빙랩스테이션 건립공사 착공	: 2023. 10.

◦ 푸른솔 커뮤니티센터 건립공사 준공	: 2023. 12.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 지속 추진   : 2023. 7.~12.

12		도시재생 뉴딜사업(도약하는 신청사 머물고싶은 삶터 남중)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 남중동 60번지 일원(남중동 신청사지역)

◦ 면    적 : 160,490㎡

◦ 사업유형 : 일반근린형

◦ 사업내용 : 생활속 어울림 플랫폼 조성, 신청사~국민생활관 가로경관 정비, 상생협력상가 및 상생마당 조성, 지역 특화 창업 및 공동체 활성화, 청사주변 상생방안 마련, 행복주택공급 및 문화복지시설 조성, 노후주거지 정비, 거버넌스 구축 및 공동체 활성화 등

◦ 총사업비 : 15,030백만원(국비 8,998 도비 1,499 시비 4,533)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
총계	15,030	1,000	2,417	4,850	6,763
국비	8,998	600	1,450	2,910	4,038
도비	1,499	100	242	485	672
시비	4,533	300	725	1,455	2,053

□ 상반기 추진실적

◦ 도시재생 집수리 지원사업 추진(75호)	: 2023. 2.~ 6.

◦ 신청사 주변 진입도로 정비공사 설계용역 완료	: 2023. 2.~ 4.

◦ 신청사~국민생활관간 가로환경 정비공사 설계용역 착수	: 2023. 2.~

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 추진	: 2023. 1.~

▸상권활력 프로젝트「여럿이 함께」추진, 주민역량강화교육 운영 등

□ 하반기 추진계획

◦ 상생협력상가(5호) 및 상생마당 조성공사 완료	: 2023. 7.~10.

◦ 신청사 주변 진입도로 정비공사 추진	: 2023. 7.~10.

◦ 주요 단위사업 지속 추진	: 2023. 7.~12.

▸생활속어울림플랫폼, 주거복지플랫폼, 집수리 정비사업 등

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 지속 추진	: 2023. 7.~12.

13		도시재생 뉴딜사업(이천년 고도의 새로운 숨결, 다시 숨쉬는 금마)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년)

◦ 위    치 : 익산시 금마면 동고도리 일원(금마 소재지 일원)

◦ 면    적 : 160,690㎡

◦ 사업유형 : 일반근린형

◦ 사업내용 : 정주환경개선사업(서동거실 조성, 동고동락 동행사업, 생태주차장, 동고도리 마실사업), 골목상권활성화(금마상권개선사업, 백제와 만나는 금리단길, 금마공감터, 선화다실), 지역공동체 강화(마을축제, 자립형 공동체 육성 및 지원)

◦ 총사업비 : 13,300백만원(국비 8,000 도비 1,333 시비 3,967)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
총계	13,300	2,000	3,100	7,500	700
국비	8,000	1,200	1,860	4,500	440
도비	1,333	200	310	750	73
시비	3,967	600	930	2,250	187

□ 상반기 추진실적

◦ 금마공감터 및 선화다실 조성 설계 추진	: 2023. 1.~ 6.

◦ 금마공감터 조성 부지매입 완료	: 2023. 2.

◦ 서동거실 조성 기획설계용역 착수	: 2023. 6.

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 추진	: 2023. 1.~

▸‘서동 선화 도시재생 꿈나무’, ‘원데이클래스’ 교육과정 운영 등

□ 하반기 추진계획

◦ 서동거실 조성 기획설계용역 완료 및 설계공모 추진	: 2023. 7.~12.

◦ 금마공감터 및 선화다실 조성공사 추진	: 2023. 9.~12.

◦ 주요 단위사업 지속 추진	: 2023. 7.~12.

▸동행골목길 개선사업, 생태주차장 조성사업 등

◦ 도시재생 활성화를 위한 주민참여 프로그램 지속 추진	: 2023. 7.~12.