2023.  7.

제252회 익산시의회(임시회)

‐ 2023 주요업무 보고 ‐

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 상반기 성과 및 반성
□	2023 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			도로기반					하천시설				하천관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19		1	4	7	4	3
현 원	20 (정원외 1)		1	5	4 (정원외 1)	4	6
증 감	-		-	1	△3	-	3

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설	:	시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업, 철도건널목개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 소유권 이전등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등 업무지원
	◦	도로기반	:	주민숙원사업, 마을안길 정비공사, 비법정도로 확포장공사, 안전한 보행환경사업, 교통사고 잦은곳 개선사업
	◦	하천시설	:	하천기본계획수립, 지방하천환경정비사업, 소하천정비사업
	◦	하천관리	:	하천유지관리(국가,지방,소하천), 용안생태습지유지관리 만경강 친수시설 유지관리, 하천점용허가 및 골재채취허가

□ 도 로 현 황

구 분	계	시 도	군 도	농어촌도로
노 선 수	1,539	1,264	23	252
연장(km)	1,184.2	461.2	201	522
확포장(km)	687.7	369.6	118	200.1
포장률(%)	58.0	80.1	58.7	38.3

□ 하 천 현 황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비 대상	개수 연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	155.797	167.836	48.1%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49.3%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	29.187	73.016	28.5%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
1,193	424	-	769	2,993,192	230,757	-	2,762,435

□ 차량보유 현황

하천관리차량

94버6749 전기1톤트럭 1대,  오토바이 1대

2023 예산집행실적

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				42,374,144	13,358,692	29,015,452	31.5
	도로시설관리			21,507,048	8,296,515	13,210,533	38.6
		시군농어촌도로확포장		6,070,325	1,611,189	4,459,136	26.5
			금마 갈산-서편간 도로확포장공사	547,193	267,882	279,311	49.0	명시 417,193
			삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	77,882	30,673	47,209	39.4	명시 77,882
			미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	42,365	57,635	42.4
			군도 23호선 도로 확포장공사	39,797	1,465	38,332	3.77	사고 39,797
			시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	70,776	0	70,776	0	사고 70,776
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	821,269	353,815	467,454	43.1	명시 450,000 사고 371,269
			오산면 소재지 진입도로 확포장공사	118,804	67,316	51,488	56.7	명시 118,804
			황등 도선-외화간 도로 확포장공사	229,577	28,227	201,350	12.3	명시 229,577
			하나로~소간촌간 도로 확포장공사	460,520	185,956	274,564	40.4	명시 460,520
			춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000	40,752	59,248	40.8	명시 100,000
			왕궁 금오동-군도22호간 도로 확포장공사	100,000	0	100,000	0
			금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	599,676	219,604	380,072	36.6	명시 249,676
			춘포 오룡선 도로확포장	215,065	91,946	123,119	42.8	명시 215,065
			황등면 하동마을~동연 지하차도 도로 개설공사	397,922	0	397,922	0	명시 97,922
			춘포 노적선 도로확포장공사	790,085	99,817	690,268	12.6	사고 140,085
			백제왕도 탐방로 조성 (익산토성)	168,090	0	168,090	0	사고 168,090
			망성 신하선 도로확포장공사	416,000	0	416,000	0	명시 66,000
			오산 용연선(모현동장례 식장~용곤마을) 도로확포장 사업	100,000	0	100,000	0	사고 100,000
			함라 행진선 도로확포장	382,669	135,536	247,133	35.4	명시 382,669
			삼기 만대선(하나로~검지마을) 도로확포장공사	80,000	0	80,000	0	명시 80,000
			금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	40,835	109,165	27.2	명시 150,000
			함라 천남길 도로확포장공사	100,000	0	100,000	0
			시군농어촌도로 확포장사업 추진	5,000	5,000	0	100
		지방도 도로확포장		386,391	80,372	306,019	20.8
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	386,391	80,372	306,019	20.8	명시 386,391
		철도건널목개량사업		203,183	8,717	194,466	4.3
			평화육교재가설	203,183	8,717	194,466	4.3	사고 203,183
		주민숙원사업		32,920	5,418	27,502	16.5
			주민숙원사업	32,920	5,418	27,502	16.5
		교통관리개선사업		1,153,106	62,221	1,090,885	5.4
			성당 삼회선 도로구조개선사업	381,725	11,356	370,369	3.0	사고 281,725
			낭산~시명 선형개량사업(전환사업)	241,381	12,547	228,834	5.2	사고 241,381
			장암사거리 회전교차로 설치	50,000	0	50,000	0
			낭산~시명 선형개량사업	100,000	38,318	61,682	38.3
			함열 상마사거리 회전교차로 설치	300,000	0	300,000	0
			황등 상다선 선형개량(전환사업)	80,000	0	80,000	0
		소규모주민숙원사업		6,396,329	1,527,894	4,868,435	23.9
			소규모주민숙원사업	739,220	189,833	549,387	25.7
			마을안길 노후도로 정비공사	4,705,894	1,200,493	3,505,401	25.5	명시 440,000 사고 135,144
			지역밀착형참여사업(마을안길)	478,502	132,482	346,020	27.7	명시 173,590 사고 31,912
			(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	472,713	5,086	467,627	1.1	명시 472,713
		위험도로개선		577,655	0	577,655	0
			교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	577,655	0	577,655	0	명시 577,655
		국도 도로확포장		6,687,139	5,000,704	1,686,435	74.8
			국도27호 대체우회도로(서수~평장2)건설공사	6,687,139	5,000,704	1,686,435	74.8	명시 487,139
	도로기반유지			300,000	0	300,000	0
		소규모주민숙원사업		300,000	0	300,000	0
			남부권 순환형 힐링 보행로 조성	300,000	0	300,000	0	명시 300,000
	하천정비			20,435,705	5,001,059	15,434,646	24.5
		하천정비및유지관리		20,435,705	5,001,059	15,434,646	24.5
			지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	6,467,518	2,893,681	3,573,837	44.7	계속 1,467,518
			지방하천정비(동면천)(전환사업)	6,199,552	776,263	5,423,289	12.5	계속 3,199,552
			소하천정비(진사천)(전환사업)	1,292,879	50,384	1,242,495	3.9	명시 1,210,324 사고 82,555
			소하천정비(황각천)(전환사업)	1,345,058	14,000	1,331,058	1.0	명시 145,058
			하천제방 유지보수(자체)	2,220,980	701,330	1,519,650	31.6	명시 115,000
			하천제방 유지보수	940,000	448,579	491,421	47.7
			국가하천유지보수(4대강)	464,000	39,784	424,216	8.6
			국가하천유지보수(4대강외)	283,000	11,984	271,016	4.2
			만경강 문화관	151,945	65,054	86,891	42.8
			국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	880,773	0	880,773	0	명시 880,773
			대조 재해위험 개선지구 정비사업	20,000	0	20,000	0
			만경강 파크골프장 화장실 기능보강	30,000	0	30,000	0
			소하천 자동 수위계측시스템 설치	140,000	0	140,000	0
	행정운영경비(건설과)			131,391	61,118	70,273	46.5
		인력운영비		98,081	45,646	52,435	46.5
			국가하천유지보수(인력운영비)	48,000	23,521	24,479	49.0
			만경강 문화관(인력운영비)	50,081	22,125	27,956	44.2
		기본경비		33,310	15,472	17,838	46.4
			기본경비	33,310	15,472	17,838	46.4

【 2023. 6. 9. 현재 】                                     (단위 : 천원, %)

2023 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 시군도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민편익 증대

▸하나로~소간촌간 도로확포장공사(L=0.6km,B=8.0m) 착공	: 2023.  3.

▸춘포 노적선 도로확포장공사(L=0.4km,B=8.0m) 착공	: 2023.  3.

▸춘포 오룡선 도로확포장공사(L=0.5km,B=8.0m) 착공	: 2023.  4.

◦ 토지수용재결 추진으로 공익사업 추진 탄력

▸춘포 노적선 도로확포장공사 수용재결 신청	: 2023.  5.

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

▸소규모 주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비 등 민원처리	: 131건

◦ 왕궁천 지방하천 정비사업을 통한 재해예방 및 영농편의 도모

▸왕궁천(왕궁2지구) 지방하천 정비사업 준공	: 2023.  6.

□ 반      성

◦ 일부 하천 준설공사 사토장 선정이 지연되어 농번기와 공사 시기가 겹쳐 민원 발생

▸	앞으로는 사토장 선정이 조기에 이루어질 수 있도록 관계 읍면동과  긴밀히 협업하겠음

2022 주요업무 추진상황

		시·군도 및 농어촌도로 확포장 서수~평장간 국도대체우회도로 용지보상 생활여건개선을 위한 주민숙원사업 지방하천 왕궁천 정비사업 지방하천 동면천 정비사업 진사소하천 정비사업 황각소하천 정비사업 만경강 친수시설 유지관리 금강 용안생태습지 유지관리 하천제방 유지관리

1		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업규모 : 24개노선 L=15.36km, B=8.0-24.0m

◦ 총사업비 : 36,891백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투자	2023년	2023년이후	비 고
36,891	10,438	6,943	19,510

□ 상반기 추진실적

◦ 공사 중 9개소	: 2023.  1. ~ 6.

▸시도 1개소, 군도 2개소, 농어촌도로 6개소 노선

◦ 보상협의 추진 7개소 (보상율 40%)	: 2023.  1. ~ 6.

▸시도 1개소, 군도 1개소, 농어촌도로 4개소, 미지정 1개소 노선

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 7개소	: 2023.  1. ~ 6.

▸군도 1개소, 농어촌도로 5개소, 미지정 1개소 노선

◦ 군도·농어촌도로 기본계획(변경) 수립용역	: 2023.  1. ~ 6.

▸전략환경영향평가 협의중(전북, 환경청)

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 완료 3개소	: 2023. 12.

▸군도 1개소, 농어촌도로 2개소 노선

◦ 공사 추진 6개소	: 2023.  7. ~

▸시도 1개소, 군도 1개소, 농어촌도로 4개소 노선

◦ 보상협의 추진 7개소 (보상율 75%)	: 2023.  7. ~

▸시도 1개소, 군도 1개소, 농어촌도로 4개소, 미지정 1개소 노선

◦ 실시설계용역 완료 7개소	: 2023. 12.

▸군도 1개소, 농어촌도로 5개소, 미지정 1개소 노선

◦ 군도·농어촌도로 기본계획(변경) 수립용역 완료	: 2023. 12.

2023년도 노선별 사업 추진 현황

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년

◦ 사업개요 : 도로확포장 L=15.36km, B=8.0~24.0m

◦ 총사업비 : 24개사업 / 36,891백만원 (2023년 예산 6,943)

◦ 노선별 추진상황

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	23년 예산액	24년 이후
계	24개 사업			L=15.36km B=8.0~24.0m	36,891	10,438	6,943	19,510
공 사 (9)	시 도 (1)	1268호	어양어곳~부평간 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	3,100	1,779	821	500	1공구 80%
	군 도 (2)	7호	성당삼산마을 회전교차로	회전교차로 1식	400	18	382	-	10% (수용재결)
		9호	낭산~시명간 선형개량사업	L=0.4km B=8.0m	632	132	500	-	80%
	농어촌 도 로 (6)	황등104호 (황팔선)	황등도선~외화간 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	800	600	200	-	90%
		금마101호 (서삼선)	금마갈산~서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,609	1,349	560	700	75%
		춘포311호 (노적선)	춘포노적선 진입도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,300	650	650	-	30%
		삼기203호 (석라선)	하나로~소간촌간 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,400	640	460	300	20%
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,330	215	215	900	10%
		왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동~군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	300	100	600	10%

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	23년 예산액	24년 이후
보 상 (7)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,780	1,152	78	2,550	65%
	군 도 (1)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.85km B=24.0m	5,000	1,948	152	2,900	56%
	농어촌 도 로 (4)	금마202호 (서오선)	금마신정~중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	2,450	651	599	1,200	77%
		춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	100	100	1,300	토지소유자 의견청취 공고
		함라301호 (행진선)	함라행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	118	382	1,570	38%
		망성201호 (신하선)	망성신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	1,000	34	416	550	토지소유자 의견청취 공고
	미지정 (1)		황등하동~ 동연지하차도 도로확포장사업	L=0.63km B=8.0m	1,400	502	398	500	40%
실 시 설 계 (7)	군 도 (1)	8호	장암사거리 회전교차로	회전교차로 1식	500	-	50	450	신규
	농어촌 도 로 (5)	함열101호 (박전선)	함열상마사거리 회전교차로	회전교차로 1식	500	-	300	200	도비50% 신규
		금마303호 (종구선)	금마종구선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,500	-	150	1,350	-
		오산301호 (용연선)	오산용연선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	900	-	100	800	-
		삼기208호 (만대선)	삼기만대선 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	-
		황등102호 (상다선)	황등상다선 도로선형개량	L=0.30km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	도비50% 신규
	미지정 (1)		함라천남길 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,000	-	100	900	신규
기 타 (1)			군도 도로관리계획 및농어촌도로기본 정비계획수립용역	1식	320	250	70	-	-

2		서수~평장간 국도대체우회도로 용지보상

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리(국도23호~국도1호)

▸1공구: 황등면 신기리, 황등리, 삼기면 용연리, 월성동, 임상동 일원

▸2공구: 삼기면 용연리, 금마면 갈산리, 용순리, 서고도리, 동고도리, 덕기동 일원

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2028. 5.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (왕복 4차선)

◦ 총사업비 : 100억원(시비)

(단위 : 억원)

총사업비	기 투 자	2023년	2024년 이후	비 고
100	10	62	28

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청(익산시 → 동지역 토지보상)

□ 상반기 추진실적

◦ 2공구 동지역 편입토지 보상협의 추진	: 2023.  1. ~ 6.

▸‘23. 6월 기준 보상률 64%

◦ 1공구 보상협의회 개최	: 2023.  3. 28.

◦ 1공구 동지역 보상계획열람공고	: 2023.  5.  4.

□ 하반기 추진계획

◦ 1공구 동지역 감정평가	: 2023.  7. ~ 8.

◦ 2공구 편입토지 보상협의 추진	: 2023.  7. ~12.

◦ 1공구 편입토지 보상협의 착수	: 2023.  9.

3		생활여건개선을 위한 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업대상 : 193건

사 업 명	사 업 량(건)	사 업 비(백만원)	비 고
합 계	193	4,575
소규모주민숙원사업	85	739
마을안길노후도로정비	99	3,263
지역밀착형참여사업	8	273	(도비 273)
남부권 순환형 힐링보행로 조성	1	300

□ 상반기 추진실적

◦ 생활여건개선을 위한 주민숙원사업 공사추진 및 완료	: 131건(68%)

▸소규모 주민숙원사업 : 함열읍 장구1마을 외 61건(73%)

▸마을안길 노후도로정비 : 함열읍 삼양마을 외 63건(65%)

▸지역밀착형참여사업(마을안길) : 황등면 후생1마을 외 4건(63%)

▸남부권 순환형 힐링보행로 조성사업 실시설계용역 착수  : 2023. 1.

- 익산경찰서, 한국농어촌공사 협의중

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여 주민숙원사업 추진 및 사업 완료

▸소규모 주민숙원사업 완료                      : 2023. 7. ~ 12.

▸마을안길 노후도로정비 완료                    : 2023. 7. ~ 12.

▸지역밀착형참여사업(마을안길) 완료             : 2023. 7. ~ 12.

▸남부권 순환형 힐링보행로 조성사업 공사 시행   : 2023. 9. ~ 2024. 4.

4		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명		위 치	사업기간 (공사기간)	사 업 비	사업 내용
왕궁천 하천환경 정비사업		춘포면 익산천 합류점 ~ 왕궁면 동용리	2015. ~ 2023.	47,368 ․공사 34,824, ․보상 5,000, ․설계, 감리 등 7,544	하천정비 L=9.25km (축제 및 보축, 노후 교량 재가설 9개소 등)
	1지구	익산천 합류점 (춘포면) ~흥암교	(2019. ~ 2022.) 준공 : ‘22. 8	23,693 ․공사 17,455 ․보상 2,500 ․설계 및 감리 등 3,738	하천정비 L=4.62km (축제 및 보축, 노후 교량 재가설 5개소 등) ▸준공 : ‘22. 8
	2지구	흥암교 ~보석박물관 (왕궁면 동용리)	(2020. ~ 2023.)	23,675 ․공사 17,369 ․보상 2,500 ․설계 및 감리 등 3,806	하천정비 L=4.63km (축제 및 보축, 노후 교량 재가설 4개소 등) ▸착공 : ‘20. 3.

□ 상반기 추진실적

◦ 왕궁천(2지구) 하천정비공사 준공	: 2023.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 왕궁 2지구 건설사업관리용역 준공	: 2023.  7.

◦ 준공실적보고(전라북도)	: 2023.  8.

5		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축(L=6.1㎞), 교량 재가설(7개소) 등

◦ 총사업비 : 17,317백만원(국 8,658 도 3,464 시 5,195)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년 이후
17,317	4,659	6,481	6,177

▸2023년 본예산액 : 3,000백만원 (도 2,100 시 900)

□ 상반기 추진실적

◦ 1차분 공사 추진(공정률 60%)	: 2022.  9. ~ 2023.  7.

▸좌안1지구 전석쌓기

▸동면4교, 5교 공사중

▸호안블록 설치중

□ 하반기 추진계획

◦ 동면천 하천정비공사(1차분) 준공	: 2022.  7.

◦ 동면천 하천정비공사(2차분) 시행	: 2022.  7. ~ 12.

▸우안 1지구 전석쌓기

▸동면 3교, 6교 기초 설치

6		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.687㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6㎞, 교량 재가설 2개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,066)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년 이후
1,500	207	1,293	0

□ 상반기 추진실적

◦ 관계 기관(부서) 협의 완료	: 2023.  5.

▸농지전용, 중앙토지수용위원회 사업인정 협의 등

◦ 도지정 문화재 현상변경 심의 완료	: 2023.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여토지 협의 보상 완료	: 2023.  7. ~  9.

◦ 공사 재착수(토공사, 구조물공사 등)	: 2023.  7. ~ 12.

7		황각소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 신용리 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.753㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축, 교량 재가설(4개소)

◦ 총사업비 : 2,000백만원(설계 150, 보상 350, 공사 1,500)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년 이후
2,000	55	1,345	600

▸2023년 본예산액 : 1,200백만원 (시비 100%)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계용역

▸주민설명회(2차)	: 2023.  2.

◦ 소규모환경영향평가 용역 준공	: 2023.  4.

□ 하반기 추진계획

◦ 국가지정 문화재 현상변경 심의 완료	: 2023.  6.

◦ 실시설계용역 준공	: 2023.  7.

◦ 편입토지 감정평가 및 협의보상	: 2023.  7. ~ 10.

◦ 공사 추진	: 2023.  8. ~ 2024. 12.

8		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=18km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 위    치 : 6개지구(신지, 목천, 춘포, 화전, 반월, 마산)

◦ 주요시설

▸자전거도로(21.71km), 파크골프장, 축구장, 인라인장 등

▸만경강문화관 : 1층(제1전시관, 로비 등)/2층(제2·3전시관, 수유실 등)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 친수시설관리, 제초, 만경강 문화관 운영 등

◦ 총사업비 : 704백만원 (국 283 도 30 시 391)

□ 상반기 추진실적

◦ 친수시설 유지관리	: 2023.  1. ~ 6.

▸볼라드 설치(28개소), 차단기 설치(2개소), 제초작업

◦ 만경강 환경정비사업 추진(1~3차)	: 2023.  3. ~ 6.

▸쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등

◦ 만경강 문화관 운영	: 2023.  1. ~ 6.

▸친환경 제품 만들기 등 「환경생각 프로젝트」/1,265명

▸해설과 함께 하는 플로깅(줍깅)/31명, 인문학 특강/50명

◦ 하천구역 내 불법점용시설물(텐트, 카라반 등) 계도	: 2023.  2. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 만경강 친수시설 유지관리, 환경정비사업	: 2023.  7. ~ 11.

◦ 만경강 제방, 산책로, 자전거도로 제초	: 2023.  7. ~ 11.

◦ 만경강 문화관 운영(문화·기획·방학 프로그램)	: 2023.  7. ~ 12.

9		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 주요시설 : 축구장 1면, 족구장 2면, 주차장, 산책로, 화장실 2개소,
관찰데크 및 생태습지 6개소 등

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초, 노후 시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 905백만원 (국 512 시 393)

□ 상반기 추진실적

◦ 금강 용안생태습지 환경정비(1~3차)	: 2023. 3. ~ 6.

▸쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등

◦ 친수시설 보수 및 보강	: 2023. 3. ~ 6.

▸수련연못 배수문 정비(돌쌓기 38㎡, 횡배수관 L=20m)

▸산책로 개설 및 정비(L=76m, B=2.5m)

◦ 초화류 파종 및 식재	: 2023. 3. ~ 6.

▸가우라 18,000본, 아스타 1,000본, 메리골드 17,640본, 구절초 3,975본

□ 하반기 추진계획

◦ 금강 용안생태습지 환경정비	: 2023. 7. ~ 11.

◦ 친수시설 보수 및 보강	: 2023. 7. ~ 11.

▸데크 및 난간 보수(데크 A=63㎡, 난간 L=50m)

▸안내판 정비(69개소), 산책로 풀깎기 L=9.5km

▸목교, 데크, 광장, 화장실 등 유지보수

◦ 초화류 파종 및 식재	: 2023. 7. ~ 11.

▸해바라기 및 백일홍 15,840㎡, 코스모스 7,640㎡ 등

10		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

▸하천준설 : 오동정천 하천준설공사 외 8건, 민원처리 등

▸제방포장 및 보수·보강 : 강경천 제방포장공사 외 6건, 민원처리 등

▸제초 및 예초 : 제방 제초작업 및 수목제거 등

▸안전점검 : 하천시설물 16개소 정기안전점검(상반기·하반기 실시)

▸지방하천 및 소하천 환경정비사업

◦ 총사업비 : 2,800백만원(도 660 시 2,140)

□ 상반기 추진실적

◦ 오동정천 외 8개소 하천준설(L=10km) 및 갈전천 수목제거(L=0.7km)	: 2023. 1. ~ 6.

◦ 익산천 외 1개소 제방포장(L=400m) 완료	: 2023. 5.

◦ 하천시설물 16개소 정기안전점검 완료	: 2023. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리, 환경정비사업	: 2023. 7. ~ 11.

◦ 하천준설, 제방포장 및 보수·보강	: 2023. 7. ~ 11.

◦ 제방 및 호안 제초·예초	: 2023. 7. ~ 11.

◦ 하천시설물 정기안전점검(하반기)	: 2023. 7. ~ 11.