2023.  7.

제252회 익산시의회(임시회)

― 2023 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 상반기 성과 및 반성
□	2023 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기          구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	6	6	6	5
현 원	24	1	8	6	3	6
증 감			2		△3	1

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사
◦	하수운영 :	공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2022.12.	비 고
시설	총인구	천명	273
	하수인구	천명	261
	보급률	%	95.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	114,028
	1일평균하수처리량	톤	111,363
	하수처리율	%	97.66
하수도 사용	개소수	전	40,551
	톤당 평균요금	원	877.97

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	준공일자	비 고
계	30	150,110㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	1995.07	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	2004.09	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	2008.06	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	2008.06	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	2009.12	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	2010.05	민간위탁 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	22	1,760㎥/일	1995~2017	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	2014.07	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	2019.12	〃

2023 예산집행실적

【 2023. 6. 9. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
하수도과				77,067,087	43,475,683	33,591,404	56.4
	하수도공기업관리(사업)			38,205,843	33,489,778	4,716,065	87.7
		하수도사업관리(사업)		34,330,567	31,952,757	2,377,810	93.1
			하수관거 유지관리	90,080	17,148	72,932	19.0
			지하수관리	32,420	2,238	30,182	6.9
			하수관거 BTL사업운영비	14,006,200	12,151,237	1,854,963	86.8
			하·폐수처리시설 운영	20,201,867	19,782,134	419,733	97.9
	행정운영경비			3,875,276	1,536,970	2,338,306	39.7
		인력운영비		3,124,285	1,278,847	1,845,438	40.9
			인력운영비	3,124,285	1,278,847	1,845,438	40.9
		기본경비		750,991	258,124	492,867	34.4
			기본경비	750,991	258,124	492,867	34.4
	예비비			100,000	0	100,000	0
		예비비		100,000	0	100,000	0
			예비비	100,000	0	100,000	0
	하수도공기업관리(자본)			38,611,244	9,985,905	28,625,339	25.9
		하수도사업(자본)		38,424,244	9,806,616	28,617,628	25.5
			남부2/1, 2/2 배수분구 하수관로정비	7,823,159	2,690,446	5,132,713	34.4	계속비이월 3,847,653천원
			북부1처리분구하수관로 정비	5,014,378	1,208,900	3,805,478	24.1	계속비이월 2,289,083천원
			함열읍 와리 우수박스 설치	645,000	30,300	614,700	4.7	건설개량이월 45,000천원
			관내 분류식 배수설비 설치	1,011,954	385,056	626,898	38.1	건설개량이월411.954천원
			흥왕 소규모 하수처리시설	664,602	0	664,602	0	계속비이월 190,602천원
			장점 소규모 하수처리시설	400,000	0	400,000	0
			상갈 소규모하수처리시설	400,000	0	400,000	0
			익산시 금마 하수처리시설 증설	724,590	0	724,590	0	계속비이월 459,590천원
			익산시 환경기초시설 악취개선	1,542,879	74,568	1,468,311	4.8	계속비이월 446,959천원
			익산 공공하수 차집관로 정비	667,000	0	667,000	0
			하·폐수처리시설 유지관리	1,820,327	98,471	1,721,856	5.4
			용안(구)분뇨처리장 철거	15,000	10,000	5,000	66.7
			지하수보전	55,000	16,300	38,700	29.6
			노후하수관로 정비-2단계	3,140,000	560,979	2,579,021	17.9	계속비이월 1,145,000천원 사고이월 1,000,000천원
			노후하수관로 정비-영등지구	1,305,343	170,200	1,135,143	13.0	계속비이월 227,343천원
			노후하수관로 정비 - 국가산업단지	2,428,290	777,707	1,650,583	32.0	계속비이월 1,193,290천원
			노후하수관로 정비-정밀조사	974,000	107,958	866,042	11.1	건설개량이월 397,000천원
			하수도 민원처리	1,981,356	1,052,474	928,882	53.1	건설개량이월597,851천원
			익산공공하수탄소중립 프로그램태양광설치	1,709,000	1,141,456	567,544	66.8	건설개량이월 1,709,000천원
			익산공공하수처리시설 하수찌꺼기감량화사업	723,582	267,783	455,799	37.0	계속비이월 723,582천원
			지하시설물지반탐사	73,000	57,906	15,094	79.3	건설개량이월 73,000천원
			화평마을 오수관로 설치공사	434,251	347,598	86,653	80.0	건설개량이월 434,251천원
			금마면 용순길 226주변 하수관로 정비공사	86,746	40,000	46,746	46.1	사고이월 86,746천원
			남부2/3,북부3처리분구 하수관거 정비사업	3,817,028	104,827	3,712,201	2.7	건설개량이월 3,817,028천원
			송학동 880번지 일원 하수관로정비공사	7,380	1,532	5,848	20.8	건설개량이월 7,380천원
			송학동 배수설비 설치공사	214,139	213,016	1,123	99.5	건설개량이월 214,139천원
			송학동 우수박스정비사업	868,390	251,290	617,100	28.9	사고이월 868.390천원
			익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계)	57,849	57,849	0	100.0	사고이월 57,849천원
	재무활동			187,000	179,289	7,711	95.9
		보전지출		187,000	179,289	7,711	95.9
			국도비집행잔액 반납	187,000	179,289	7,711	95.9
	예비비(자본)			150,000	0	150,000	0
		예비비(자본)		150,000	0	150,000	0
			예비비(자본)	150,000	0	150,000	0

2023 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율 개선

‣남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 추진(공정률 35.3%)

- 관로정비 3.2km, 배수설비 957개소

‣북부1처리분구 하수관로 정비사업 발주

- 1차분 공사 착공(2023.03.30.)

‣황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 준공

- 오수신설 0.57km, 배수설비 33개소, 맨홀펌프장 1개소

‣송학동 배수설비 설치공사 준공

- 오수관로(D200mm) L=0.292km, 배수설비 31가구

‣화평마을 오수관로 설치공사 준공

- 오수관로 L=0.32km, 배수설비 7가구

‣하수시설 민원처리 배수설비 설치공사 11건 처리 완료

◦ 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 완료

‣기존 소화조 개량(10,000㎥/일) 및 소화조 증설(6,692㎥/일)

‣협작물처리기, 농축시설 및 저류조 운영방식 개선 및 반류수처리시설 설치

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣환경기초시설 악취개선사업 실시설계용역 시행을 통한 악취 저감 추진

‣수질측정기기 TOC교체 등 기능보강공사 추진으로 방류 수질관리 철저

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣소규모 공사 82건 및 생활민원 133건 처리

‣생활민원 처리를 위한 비상근무조(4개조,12명) 운영 : 1,224건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 함열읍 와리 우수박스 설치공사 실시설계용역 추진 중 행정절차(설계안정성 검토) 지연으로 착공 지연

‣설계안정성 검토 용역 시행 및 준공(2023.8.) 후 2023. 9월 착공 예정

		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 함열읍 와리 우수박스 설치공사 장점 소규모하수처리시설 신설 상갈 소규모하수처리시설 신설 환경기초시설 악취개선 사업 공공하수처리시설 운영관리(BTO) 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 영등지구 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

2023 주요업무계획

1		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구, 맨홀펌프장 9개소, 자가펌프장 11개소

◦ 총사업비 : 37,386백만원(국비  13,559 도비 2,382 시비  21,445)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020이전	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	37,386	1,321	2,604	6,374	3,976	23,111
국비( 36%)	13,559	642	1,366	4,655	1,961	4,935
도비( 6%)	2,382	64	136	465	345	1,372
시비( 58%)	21,445	615	1,102	1,254	1,670	16,804

□ 상반기 추진실적

◦ 공정률 : 35.3% (관로 3.2㎞, 배수설비 957개소)

◦ 2차분 공사 추진	: 2022. 7. 12. ~ 2023. 8. 30.

▸신설오수관로 L=276m, 굴착교체 L=417m, 배수설비 설치 132개소

◦ 3차분 공사 추진	: 2023. 3. 6. ~ 2024. 3. 4.

▸신설오수관로 L=509m, 굴착교체 L=976m, 배수설비 설치 333개소

□ 하반기 추진계획

◦ 2차분 공사 준공	: 2023. 8. 30.

▸신설오수관로 L=19m, 굴착교체 L=181m, 부분보수 1,446개소

◦ 3차분 공사 추진	: 2023. 3. ~ 2024. 3.

▸신설오수관로 L=371m, 굴착교체 L=754m, 배수설비 설치 100개소

2		북부1처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2026. 3.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=28.4km, 배수설비 1,363가구

◦ 총사업비 : 44,242백만원(국비 24,851 도비 1,939 시비 17,452)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	44,242	714	1,153	2,019	2,725	37,631
국비( 56%)	24,851	500	1,010	1,411	2,503	19,427
도비( 4%)	1,939	21	43	60	107	1,708
시비( 40%)	17,452	193	100	548	115	16,496

□ 상반기 추진실적

◦ 1차분 공사 착공	: 2023. 3. 30. ~ 2023. 12. 10.

□ 하반기 추진계획

◦ 1차분 공사 준공	: 2023. 12. 10.

▸신설오수관로 L=534m, 전체보수 L=1,521m, 부분보수 설치 437개소

◦ 2차분 공사 시행	: 2023. 12. ~ 2024. 12.

3		함열읍 와리 우수박스 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열읍 와리 315번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 우수박스 신설 1.5×1.5 L=430m

◦ 총사업비 : 1,200백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계용역 시행	: 2023. 2.

◦ 실시설계용역 중지	: 2023. 6.

▸행정절차 추진(설계 안전성 검토)

□ 하반기 추진계획

◦ 설계 안전성 검토 용역 시행	: 2023. 6. ~ 8.

◦ 실시설계용역 준공	: 2023. 9.

◦ 시설공사 시행	: 2023. 9. ~ 12.

4		장점 소규모하수처리시설 신설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함라면 신등리 일원(장점, 왈인, 장고재, 장등, 진산, 망월, 회룡마을)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 신설 65㎥/일

◦ 총사업비 : 7,538백만원(국비  4,523 도비 1,507 시비  1,508)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	7,538	400	2,915	4,223
국비( 60%)	4,523	300	1,689	2,534
도비( 20%)	1,507	100	563	844
시비( 20%)	1,508	0	663	845

□ 상반기 추진실적

◦ 설계내역서 작성 및 원가심사	: 2023. 1. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2023. 9.

5		상갈 소규모하수처리시설 신설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 삼기면 서두리 일원(상갈, 하갈, 신평, 화초, 원서두마을)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 신설 60㎥/일

◦ 총사업비 : 5,018백만원(국비  3,011 도비 1,003 시비  1,004)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	5,018	400	1,906	2,712
국비( 60%)	3,011	300	1,084	1,627
도비( 20%)	1,003	100	361	542
시비( 20%)	1,004	0	461	543

□ 상반기 추진실적

◦ 설계내역서 작성 및 원가심사	: 2023. 1. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2023. 9.

6		환경기초시설 악취개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 총 8개소(익산·분뇨·북부·함열·금마·여산하수,1·2중계펌프장)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 악취방지시설 신규 설치 및 용량 재구성 등

◦ 총사업비 : 7,995백만원(국비 4,320 도비 1,838 시비 1,837)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	7,995	667	1,096	6,232
국비( 54%)	4,320	500	755	3,065
도비( 23%)	1,838	167	326	1,345
시비( 23%)	1,837	0	15	1,822

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 용역 착수                                : 2022. 6.

◦ 실시설계 용역 중지                                : 2022. 11.

◦ 총사업비 변경 및 재원협의(전북지방환경청)          : 2023. 2.

◦ 전북지방환경청 재원협의 보완 요청                 : 2023. 5.

▸1・2중계펌프장 악취기술진단 결과보고서 제출

◦ 1・2중계펌프장 악취기술진단 신청                  : 2023. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 1・2중계펌프장 악취기술진단 완료                 : 2023. 8.

◦ 재원 협의 보완	: 2023. 8.

◦ 실시설계용역 준공	: 2023. 9.

◦ 행정절차 이행(설계심의, 원가심사 등)	: 2023. 10.

◦ 시설공사 발주	: 2023. 11.

7		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소, 중계펌프장 17개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

◦ 2023년 BTO위탁운영비 : 16,590백만원(도비 590 시비 16,000)

□ 상반기 추진실적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개 항목)

▸방류수수질기준 1회/일 검사(BOD, TOC, T-N, T-P, 총대장균수)

◦ 익산공공 외 3개 하수처리시설 1, 2분기 복합악취농도 기준 준수(부지경계 등)

◦ 익산하수 총인처리시설 보수 외 12건 보수 및 개선 실시	: 2023. 1. ~ 6.

◦ 공공하수처리시설(BTO) 안전점검 실시	: 2023. 1. ~ 6.

▸익산 외 3개 공공하수처리시설 해빙기, 안전대전환 안전점검 완료

◦ 익산시 공공하수처리시설 상반기 하수찌꺼기 성분검사 완료 : 2023. 3.

◦ 공공하수처리시설(BTO) 노후 설비 교체 추진 : 2023. 05.

▸익산하수 1,2,3중계펌프장 비상발전기, 금마하수 원심탈수기, 함열하수 감시제어설비

□ 하반기 추진계획

◦ 하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 3, 4분기 시행	: 2023. 7. ~ 12.

◦ 함열공공하수 대수선 시행 및 완료	: 2023. 7. ~ 11.

▸세목스크린, 반응조 유입·출 밸브 등 교체

8		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 25개소

▸여산 1, 소규모 22, 제3산업단지 1, 국가식품클러스터 1

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,760	105개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), (유)일토씨엔엠 2023. 01. ~ 2025. 08.]

◦ 2023년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비 : 3,209백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리

▸공공하·폐수처리시설 및 중계펌프장 점검 및 관리(주 4~5회 수시 점검)

▸23개 처리시설 용량별 방류수 수질검사 실시

- 500톤/일 이상 3개소 일 1회, 50~500톤/일 12개소 주 1회,

50톤/일 미만 10개소 월 1회 수질검사

◦ 여산 공공하수처리시설 반송 슬러지 펌프 수리	: 2023. 3.

◦ 제3산단 탈수기 제어용 PLC교체	: 2023. 4.

◦ 국가식품클러스터 세목스크린 보수 실시	: 2023. 4. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리	: 하반기

◦ 제3산단 외 4개소 하수처리시설 기술진단 추진	: 2023. 7. ~ 11.

◦ 공공폐수처리시설 운영‧관리 실태평가(환경부)	: 2023. 8.

◦ 제3산단 및 국가식품폐수, 여산하수 복합악취측정	: 분기별

9		익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.63km

※ 평화동(1,250m), 송학동(910m), 모현동(470m)

◦ 총사업비 : 17,350백만원(국비 8,355도비 835 시비 8,160)

※ 2023년 사업비: 995백만원(국비 902 도비 90 시비 3)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022년	2023	2024	비고
합계(100%)	17,350	1,220	1,145	995	13,990
국비( 50%)	8,355	500	1,041	902	5,912
도비( 5%)	835	50	104	90	591
시비( 45%)	8,160	670		3	7,487

□ 상반기 추진실적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016. 3.

◦ 2021년 국고보조사업 확정	: 2020. 9.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

◦ 설계경제성(VE) 검토 용역 시행	: 2020. 11.

◦ 특허, 신기술 공법 선정	: 2022. 12.

◦ 기술자문위원회, 재원협의등 행정절차 추진	: 2023. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 원가심사	: 2023. 6.

◦ 공사 착수 및 완료	: 2023. 7. ~ 2025. 12.

10		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 13,555백만원(국비 6,394 도비 640 시비6,521)

※ 2023년 사업비: 1,235백만원(국비 742 도비 74 시비 419)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	13,555	1,190	1,215	1,235	9,915
국비( 50%)	6,394	500	851	742	4,301
도비( 5%)	640	50	85	74	431
시비( 45%)	6,521	640	279	419	5,183

□ 상반기 추진실적

◦ 환경부(전북지방환경청) 재원협의 보완	: 2022. 5.

◦ 환경관리공단 기술검토 의뢰	: 2022. 6.

◦ 환경관리공단 기술검토 의견회신	: 2022. 6.

◦ 환경부(전북지방환경청) 재원협의 완료	: 2022. 7.

◦ 공사 착공 및 건설사업관리용역 업체 선정	: 2022. 12. ~ 2023. 4.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

11		영등지구 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동(5,854m), 마동(1,060m), 남중동(286m) 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 노후하수관로정비 L=7.2km

◦ 총사업비 : 6,306백만원(국비 3,153 도비 315 시비 2,838)

※ 2023년 사업비: 1,078백만원(국비 1,034 도비 44)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022이전	2023	2024	비고
합계(100%)	6,306	550	1,078	4,678
국비( 50%)	3,153	500	1,034	1,619
도비( 5%)	315	50	44	221
시비( 45%)	2,838	0	0	2,838

□ 상반기 추진실적

◦ 2022년 환경부 신규 국고보조사업 확정	: 2021. 10.

◦ 실시설계용역 조달 발주 의뢰	: 2022. 4.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2023. 6.

◦ 실시설계용역 준공	: 2023. 7.

◦ 시설공사 발주	: 2023. 7.

12		소규모 하수도 시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 1,163백만원 (시비)

◦ 사업내용

▸소규모 하수도시설 정비공사	: 15건 / 500백만원

▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 25건 / 263백만원

- 함열읍 하시하마을 하수도 정비공사 외 24건

▸하수관로 기계준설	: 12건 / 400백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸상반기 공사 발주 12건(422백만원)	: 2023. 1. ~ 2023. 6.

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)

▸상반기 공사 21건 완료(211백만원)	: 2023. 1. ~ 2023. 6.

◦ 하수관로 기계준설

▸상반기 공사 발주 5건(191백만원)	: 2023. 1. ~ 2023. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸하반기 공사 발주 4건(130백만원)	: 2023. 7. ~ 2023. 12.

◦ 하수관로 기계준설

▸하반기 공사 발주 7건(209백만원)	: 2023. 7. ~ 2023. 12.