시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 주요성과 및 반성
□	2023 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 안전 및 보건에 관한 체계적인 관리시스템 구축으로 중대재해예방 재해위험 및 취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보

일   반   현   황

□ 기      구

								시민안전과
안전총괄				자연재난					중대재해				방재시설			민 방 위

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	5	7	5	4
현 원	23		1	5	7	3	7
증 감	1		-	-	-	△2	3	(시간선택제 임기제라급 2)

□ 사 무 분 장

◦ 안전총괄 : 안전관리계획 총괄, 안전문화교육, 시민안전보험, 안전신문고, 재난관리기금, 재난안전상황실, 안전관련 민관 협력체계구축, 재난안전통합지원본부(사회재난), 안전한국훈련, 유‧도선사업, 승강기 관리, 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설 관련 등

◦ 자연재난 : 재난안전통합지원본부 운영(자연재난), 배수펌프장 및 배수문 유지관리, 가뭄‧한파‧폭염 종합대책, 자연재난 사전대비, 예‧경보시설, 그늘막 관리 등

◦ 중대재해 : 중대재해예방 종합계획 수립, 매뉴얼 작성·운영, 관련법령상 이행조치 관리, 산업안전보건 관리체계 구축

◦ 방재시설 : 사전재해영향성 검토, 우수저류시설 설치사업, 자연재해위험지구정비사업, 급경사지 정비사업, 소규모 위험시설 정비사업

◦ 민 방 위 : 국가기반체계 보호 및 비상대비훈련, 충무계획, 민방위 시설·장비 관리, 통합방위협의회, 민방위 기본계획, 사회복무요원 관리

□ 각종 위원회 현황

(단위 : 명)

구 분	구 성	구 분	구 성
계	5개 72명
안전관리 위원회	15 ▸공무원 6 ▸군 인 2 ▸공 사 4 ▸기업인 3	재난관리기금 운용심의위원회	9 ▸공무원 4 ▸시의원 1 ▸전문가 2 ▸교 수 2
안전관리민관 협력위원회	18 ▸공무원 7 ▸시의원 1 ▸공 사 1 ▸교 수 1 ▸기업인 3 ▸민간인 5	재해영향평가 위원회	20 ▸공무원 2 ▸교 수 5 ▸전문가 13
산업안전보건 위원회	10 ▸공무원 5 ▸공무직 5

□ 방재시설 및 재해취약시설(지구) 현황

구 분	계	배 수 펌프장	수 문	게이트 펌 프	대규모 공사장	산사태	인명피해 우려지역
개소	106	9	11	1	9	33	43

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	19개소	-	98개소	6개소	38개소	15,425점

2023 예산집행실적

【2023. 9. 22. 현재】                                        (단위 : 천원, %)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
시민안전과				37,216,599	12,969,514	24,247,085	34.8
	안전총괄관리			550,464	343,506	206,958	62.4
		안전관리		386,849	242,374	144,475	62.7
			안전도시만들기	207,916	113,331	94,585	54.5
			안전도시만들기(보조)	97,400	77,400	20,000	79.5
			자율방재단운영관리	39,306	13,509	25,797	34.4	11월 중 집행예정
			자율방재단운영관리(보조)	10,700	6,607	4,093	61.7
			의용소방대지원	17,500	17,500	0	100
			무더위쉼터 냉난방기 점검 지원	14,027	14,027	0	100
		중대재해예방		163,615	101,132	62,483	61.8
			중대재해예방	163,615	101,132	62,483	61.8
	재해 및 재난 예방			33,880,664	10,328,482	23,552,182	30.5
		인적재난 예방사업운영		234,392	48,269	186,123	20.6
			국가재난대응종합훈련	5,168	0	5,168	0	특별재난지역 훈련제외
			재난대응종합훈련	13,500	851	12,649	6.3	특별재난지역 훈련제외
			재난관리시설물안전점검	215,724	47,418	168,306	22.0	10월 중 집행예정
		자연재난예방사업운영		716,394	224,206	492,188	31.3
			배수장,수문유지관리	617,944	170,507	447,437	27.6	준공시기미도래 (24. 3월 예정)
			배수장,수문유지관리지원	85,000	44,800	40,200	52.7
			풍수해보험	13,450	8,899	4,551	66.2
		재해재난대비사업운영		565,859	242,710	323,149	42.9
			재해재난예방 및 복구지원	412,469	157,875	254,594	38.3	월별집행
			재해재난예방 및 복구지원(보조)	88,000	59,796	28,204	68.0
			재난종합상황실 운영	4,320	2,954	1,366	68.4
			재해재난예방	35,070	9,334	25,736	26.6	12월 중 집행예정
			자연재난 응급복구 (중장비 임차)	26,000	12,751	13,249	49.0	집행사유 미발생

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		재해위험·취약지역정비		32,364,019	9,813,297	22,550,722	30.3
			우수저류시설 설치(보조)	3,055,217	1,765,413	1,289,804	57.8	10월 중 준공예정
			재해위험지역정비(보조)	23,416,026	6,733,193	16,682,833	28.8	명시, 사고
			급경사지정비사업(보조)	5,692,917	1,197,464	4,495,453	21.0	명시, 사고
			전선로 지중화 사업	199,859	117,227	82,632	58.7	10월 중 집행예정
	민방위운영			1,032,669	596,120	436,549	57.7
		민방위대관리		1,032,669	596,120	436,549	57.7
			국민참여 민방위의 날 훈련경비	7,450	250	7,200	3.4	특별재난지역 훈련제외
			국민참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900	1,900	0	100
			을지연습운영	17,748	1,913	15,835	10.8	특별재난지역 훈련제외
			민방위 화생방 장비 보급	1,500	1,455	45	97.0
			민방위시설·장비 유지보수	36,350	27,547	8,803	75.8
			민방위교육훈련 및 시설장비확충	18,000	12,240	5,760	68.0
			민방위교육훈련 및 시설장비확충(보조)	9,120	5,556	3,564	60.9
			사회복무요원관리 (사회서비스분야인력경비)	877,251	497,006	380,245	56.7
			민방위교육운영비(보조)	20,232	8,000	12,232	39.5	보충교육예정(10/16~10/21)
			민방위경보사각지역해소	40,000	37,135	2,865	92.8
			민방위대피시설 비상용품확충(보조)	3,118	3,118	0	100
	재무활동			1,629,762	1,625,603	4,159	99.7
		내부거래지출		1,620,000	1,620,000	0	100
			내부거래지출	1,620,000	1,620,000	0	100
		보전지출		9,762	5,603	4,159	57.4
			보전지출	9,762	5,603	4,159	57.4
	행정운영경비			123,040	75,803	47,237	61.6
		인력운영비		91,655	56,398	35,257	61.5
			중대재해 인력운영비	91,655	56,398	35,257	61.5
		기본경비		31,385	19,405	11,980	61.8
			기본경비	31,385	19,405	11,980	61.8

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 겨울철 대설·한파 대책추진 최우수 기관 선정 (228개 시·군·구 중 1위)

▸행정안전부 장관 기관 표창 및 교부세 인센티브 1억원 확보

◦ 2023년 재난관리평가 최우수기관 선정 (전북 14개 시·군 중 1위)

◦ 2023년 집중안전점검 우수 시군 선정 (우수상)

◦ 지역·현장 재난안전점검 역량강화 지원사업 선정 (특교세 1억 확보)

◦ 생활 속 안전관리로 재난 없는 도시 조성

‣익산시민 안전보험 가입	: 21개 항목 103백만원 (DB손해보험)

‣초·중·고 맞춤형 안전교육	: 28개 학교 50회 3,789명

◦ 건축공사장 추락사고 예방을 위한 안전점검 실시 : 5. 15. ~ 5. 24.

‣24개소(2개반) 점검 및 현장 시정조치 완료(5개소 : 발판 미고정 등)

◦ 재해위험·취약지역 정비로 자연재해 발생 최소화

‣인화지구 우수저류시설 설치공사 추진 : 공정률 98%

‣재해위험개선지구 정비사업 추진 : 3개소(석탄, 여산, 판문)

‣급경사지 정비사업 추진 : 5개소(송천, 성당, 아리랑, 용두산, 기산)

◦ 호우 및 태풍 재난 대응

‣기상(호우·태풍)특보에 따른 재난안전대책본부 운영(17회)

‣사유시설 재난지원금 및 특별위로금 지급(5,800여명, 230억원)

‣공공시설 기능(55건, 219억원)·개선(1건, 64억) 복원사업 확정

□ 반      성

◦ 재해위험·취약지역 정비사업 지연

‣용지 보상, 문화재청, 행정안전부 등 관련 부처 협의 지연으로 집행률이 저조하나, 관계 기관 및 부처에 신속한 절차 진행 요청으로 사업 기간 내에 마무리될 수 있도록 노력하겠음

		시민과 함께하는 안전문화 확산 안전사고 예방을 위한 안전관리 강화 자연재해 최소화를 위한 선제적 대응 재해예방 시설물 유지관리 및 보수보강 중대재해예방 및 관리체계 구축 인화지구 우수저류시설 설치공사 석탄 재해위험개선지구 정비사업 여산 재해위험개선지구 정비사업 판문 재해위험개선지구 정비사업 급경사지 정비사업 국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

2023 주요업무결산

1		시민과 함께하는 안전문화 확산

□ 사 업 개 요

◦ 안전교육 및 문화 확산으로 일상생활 속 시민안전 인식 제고 필요

◦ 재난·재해 대비 및 대응역량 강화 필요

※ 2022년 사회 안전에 대한 인식률(전반적인 사회안전, 통계청) : 안전 33%, 보통 45%, 불안 22%

□ 추 진 실 적

◦ 안전점검의 날 안전문화 캠페인 실시(7회)	: ’23. 3.~9.

▸시기별⸱계절별 테마*에 맞게 매월 1회 점검 추진

* 화재 안전, 학교주변 위해요인, 행락철 안전사고, 여름철 자연재해 등

◦ 생활안전사고 예방 초‧중‧고 맞춤형 안전교육 실시	: ’23. 4.~9.

▸28개 학교 50회 3,789명 (전기, 가스, 교통, 심폐소생술, 화재대피, 완강기체험)

◦ 익산시 시민안전보험 확대 및 홍보	: 상시

▸보장항목 기존 15건 ⟶ 확대 21건, 읍면동 홍보물 배부 (리플릿 1,600, 배너 30)

◦ 화재 예방 및 피해주민 지원

▸화재대피용 방연마스크 54개소 비치(요양병원, 지역아동센터 등)

▸소방취약계층 주택용 소방시설(단독경보형감지기, 소화기) 지원

- 466세대(기초생활수급자 300, 독거노인 119, 장애인 24, 다문화가족 23)

▸「익산시 화재피해주민 지원에 관한 조례」 피해지원금 지급

- 11명(전소 2, 반소 6, 부분소 3) / 34백만원

□ 마무리 대책

◦ 안전점검의 날 안전문화 캠페인 실시	: 매월 4일

◦ 유도선 화재 대비 민․관 합동훈련	: ’23. 10.

▸실전과 같은 통합훈련 실시로 재난대응 역량 강화

2		안전사고 예방을 위한 안전관리 강화

□ 사 업 개 요

◦ 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전 예방 필요

◦ 생활 주변 안전관리 강화로 각종 안전 위해요소 제거 필요

□ 추 진 실 적

◦ 안전한 도시만들기를 위한 집중안전점검 및 특별점검 추진      : ’23. 1.~6.

▸해빙기 시설물 안전점검	: 총 207개소(현지시정 3개소, 보수보강  8개소)

▸’23년 집중안전점검	: 총  89개소(현지시정 4개소, 보수·보강 10개소)

◦ 시설물안전관리법 대상 시설물 관리

▸제3종시설물 지정 실태조사 용역발주 (’23년도 대상 : 총 166개소)   : ’23. 4.

▸2024년도 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 기본계획 수립    : ’23. 6.

◦ 지역축제·옥외행사 안전관리위원회 심의 및 점검 추진    : ’23. 1.~9.

▸안전관리위원회 심의 개최     : 4회(문화재야행 외 7개 안건)

▸유관기관 합동점검            : 16회(지역축제 6회, 행사 10회)

◦ 재난안전통신망(협업부서 및 경찰, 소방 등 유관기관 참여) 운영 및 활용 : 상시

▸매일 1회 정기교신, 매월 2회 시나리오 훈련 및 자체교육 실시

□ 마무리 대책

◦ ’23년 집중안전점검 후속조치(이행확인 등) 관리 강화       : ’23.  9.~12.

◦ 지역축제·옥외행사 안전관리 및 개최현황 수시 파악     : ’23.   9.~12.

◦ 제3종시설물 지정 실태조사 용역 준공 및 제3종시설물 지정·고시     : ’23.  10.~12.

3		자연재해 최소화를 위한 선제적 대응

□ 사 업 개 요

◦ (재난대응) 여름철, 겨울철 재난상황 대응계획 수립 및 시행

▸여름철 : 사전대비  2. 20. ~  5. 14. 재해 대책기간  5. 15. ~      10. 15. (5개월)

▸겨울철 : 사전대비 10. 1. ~ 11. 14. 재해 대책기간 11. 15. ~ 익년 3. 15. (4개월)

◦ (시설보강) 자연재해 예방시설 보강사업 820백만원(도비 410, 시비 410)

▸사업대상 5건 : 경보·관측·재해예방시설 보수·보강 등

□ 추 진 실 적

◦ 여름철 자연재난 사전대비를 위한 민·관 유관기관 간담회	: ’23. 2. 17.

▸13개 협업부서, 농어촌공사, 경찰, 소방, KT, 자율방재단 등

◦ 집중호우 대비 인명피해 우려지역(43개소) 전수점검	: ’23. 3.~5.

◦ 재해예방시설(배수펌프장, 배수문 등) 점검 및 가동훈련	: ’23. 3.~5.

◦ 자연재해 예방시설 보강사업 착수	: ’23. 5.

◦ 기상(호우·태풍)특보에 따른 재난안전대책본부 운영(17회)	: ’23. 5.~9.

◦ 호우 및 태풍 피해 대응	: `23. 5.~9.

▸배수펌프장 가동 및 예경보시설 운영

▸주민 사전대피 권고(5회: 26개소, 765명) 및 대피명령(1회: 3개소, 351명)

▸재난상황실 운영(17회, 2,120명 근무)

◦ 여름철 폭염종합대책 추진	: ’23. 5.~9.

▸폭염피해예찰활동 추진, 폭염저감시설 운영 등(무더위쉼터 499개소, 그늘막 168개소)

◦ 수방장비(양수기, 수중펌프) 읍·면·동 배부	: ’23. 8. 31.

◦ 호우 및 태풍 “카눈” 재난지원금 지급 및 복구사업추진	: ’23. 9. ~

□ 마무리 대책

◦ 겨울철 자연재난 대비 대응계획 수립 및 사전점검	: ’23. 10. ~ 11.

◦ 겨울철 자연재난 대응 및 재대본 운영	: ’23. 11.15.~’24.3.15.

◦ 자연재해 예방시설 보강사업 완료	: ’23. 12. 한

▸자동음성통보시스템, 강우량계 및 적설계, 배수펌프장 및 배수문 보강사업 등

4		재해예방 시설물 유지관리 보수보강

□ 사 업 개 요

계	배수 펌프장	배수문	우수 저류시설	예·경보 시스템	기상관측 장비	재대본 홈페이지	재해문자 전광판
210	9	12	3	141	42	1	2

◦ 재난예방 시설물 현황                              (단위 : 개소)

◦ 주요 추진사항

▸배수펌프장 및 배수문 정기·정밀 안전점검 용역

▸시설물 점검에 따른 결함, 노후 장비 보수·보강

▸재난 예·경보 시설 및 기상 관측장비(홈페이지) 유지관리 용역

□ 추 진 실 적

◦ 재해예방 시설물 유지관리 용역 추진	: ’23. 1.~9.

▸예·경보시스템, 기상관측장비, 재대본 홈페이지, 재해문자전광판 등(186개소)

◦ 시설물 점검에 따른 결함, 노후장비 보수·보강 / 23백만원	: ’23. 2.~3.

◦ 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 추진 / 161백만원	: ’23. 2.~9.

▸정기안전점검 : 29개소(상반기 19개소, 하반기 10개소)

▸정밀안전점검 : 9개소

□ 마무리 대책

◦ 재해예방 시설물 유지관리 용역 시행	: 연  중

◦ 배수펌프장 및 수문 일상 보수·보강 시행	: 연  중

5		중대재해예방 및 관리체계 구축

□ 사 업 개 요

◦ 중대재해예방을 위한 안전보건체계 구축으로 종사자와 시민 보호

◦ 사 업 비 : 159백만원(시비)

◦ 적용대상

▸중대산업재해 : 시 산하 전직원(약 2,800명) 및 도급·용역·위탁사업 종사자 포함

▸중대시민재해 : 공중이용시설 99개소(시설물안전리법, 실내공기질관리법 등)

◦ 주요사업

▸중대재해 컨설팅용역, 작업환경 측정, 근골격계유해요인조사, 위험성평가 등

□ 추 진 실 적

◦ 2023년 중대재해예방 안전계획 수립	: ’23. 3. 2.

◦ 관리감독자 정기교육 실시	: ’23. 3.~5.

◦ 근골격계 유해요인조사 용역 실시	: ’23. 3.~5.

◦ 중대재해처벌법 대응 컨설팅 용역 실시	: ’23. 4.~7.

◦ 상반기 중대재해예방 전직원 교육 실시	: ‘23. 5. 16.

◦ 상반기 작업환경측정 용역 실시	: ’23. 5.~6.

◦ 중대재해 예방 상반기 의무이행사항 점검	: ’23. 6.~7.

◦ 상반기 위험성평가 용역 실시(정기평가)	: ’23. 6.~8.

◦ 하반기 중대재해예방 전직원 교육 실시	: ’23. 9. 21.

◦ 산업안전보건위원회 개최(1분기, 2분기)	: 2회

◦ 사업장 순회점검(63개소)	: 연  중

◦ 안전·보건 관리 위탁	: 연  중

▸안전·보건관리자 업무 지원 및 산업보건의 업무 수행

□ 마무리 대책

◦ 산업안전보건위원회 개최(3분기, 4분기)	: 2회

◦ 하반기 작업환경측정 용역 실시	: ’23. 10.~11.

◦ 하반기 위험성평가 용역 실시(수시평가)	: ’23. 10.~12.

◦ 중대재해 예방 하반기 의무이행사항 점검	: ’23. 11.~12.

6		인화지구 우수저류시설 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 주현동 203번지(1지구), 동산동 1048번지(2지구)

◦ 사업규모 : 우수저류시설 설치 18,920㎥(인화1 : 8,570㎥, 인화2 : 10,350㎥)

◦ 총사업비 : 24,205백만원(국비 11,500, 도비 3,450, 시비 9,255)

▸기투자 : 23,000백만원(국비 11,500, 도비 3,450, 시비 8,050)

▸‘23년도 :  1,205백만원(국비      0, 도비    0, 시비 1,205)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

□ 추 진 실 적

◦ 도시관리계획(마동지구단위계획) 결정(변경)	: ’19. 12.

◦ 공사 착공	: ’20.  4.

◦ 우수저류시설 설치공사 추진(공정률 98%)	: ’23.  9.

▸1지구 : 저류조·건축·기계 공사 완료, 상부주차장·유출입관로 포장 공사 중

▸2지구 : 저류조·건축·기계 공사 완료, 상부공원 공사 중

□ 마무리 대책

◦ 부대시설 설치 및 준공	: ’23. 10.

▸1지구 : 상부 주차장 조성(주차대수 58대)

▸2지구 : 상부 어린이공원 조성, 지중화 구간 포장 복구(’23. 12.)

◦ 전선로 지중화 사업 완료	: ’23. 12.

▸배전선로 지중화 L=250m(한전주 및 통신주)

◦ 시설물 인수인계	: ’23. 12.

▸1지구 노상주차장 : 교통행정과

▸2지구 공원 : 녹색도시관리사업소

7		석탄 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 석탄동 1016-91번지 일원

◦ 사업규모 : 펌프장 증설(1개소 Q=30㎥/s, 펌프 8대), 관로개선 L=358m

◦ 총사업비 : 29,165백만원(균특 5,132, 국비 9,450, 도비 5,833, 시비 8,750)

▸기투자 : 18,900백만원(균특     0, 국비 9,450, 도비 3,780, 시비 5,670)

▸2023년 :  2,000백만원(균특 1,000, 국비     0, 도비  400, 시비   600)

▸2024년이후 : 8,265백만원(균특 4,132, 국비   0, 도비 1,653, 시비 2,480)

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년

□ 추 진 실 적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2019-93호)	: ’19.  9.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’20.  5.

◦ 사전설계검토 심의(행정안전부)	: ’22.  7.

◦ 기술자문위원회 심의(익산시 감사위원회)	: ’22.  8.

◦ 계약심의위원회 심의(익산시 회계과)	: ’22. 10.

◦ 공사 착공	: ’22. 12.

◦ 계속 공사 추진(공정율 20% : 펌프장 증설구간 터파기 중)	: ’23.  9.

□ 마무리 대책

◦ 계속 공사 추진	: ’23. 10.

▸토목(펌프장), 건축(기계실), 기계(펌프), 전기(배전반)

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

8		여산 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 여산리 412-4번지 일원

◦ 사업규모 : 배수로 신설 L=350m, 우수관로 정비 L=4,800m, 펌프장 Q=21.0㎥/min 및 저류지 1개소(V=3,400㎥) 설치, 강경천·닭작골천·유성천 정비

◦ 총사업비 : 38,000백만원(균특 18,000, 국비 1,000, 도비 7,600, 시비 11,400)

▸기투자 :  2,000백만원(균특     0, 국비 1,000, 도비   400, 시비   600)

▸2023년 :  3,000백만원(균특 1,500, 국비    0, 도비   600, 시비  900)

▸2024년이후 : 33,000백만원(균특 16,500, 국비 0, 도비 6,600, 시비 9,900)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년

□ 추 진 실 적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호)	: ’20.  8.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’21. 12.

◦ 제1차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’22.  2.

◦ 제2차 주민설명회(여산면행정복지센터)	: ’22.  3.

◦ 기본설계 사전설계검토(행정안전부)	: ’22. 12.

◦ 문화재 지표조사	: ’23.  8.

◦ 실시설계 사전설계검토(행정안전부 : 조건부 의결)	: ’23.  9.

□ 마무리 대책

◦ 도지정문화재 현상변경(여산숲정이순교성지 외 4개)	: ’23. 10.

◦ 기술자문위원회 심의(익산시 감사위원회)	: ’23. 10.

◦ 계약심의위원회 심의(익산시 회계과)	: ’23. 12.

◦ 공사 착공	: ’24.  2.

◦ 공사 준공	: ’25. 12.

9		판문 재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 춘포면 용연리 529-5번지 일원

◦ 사업규모 : 수로정비 L=820m, 우수관로정비 L=283m, 교량 4개소

◦ 총사업비 : 4,400백만원(균특 610, 국비 1,590, 도비 880, 시비 1,230)

▸기투자 : 3,180백만원(균특   0, 국비 1,590, 도비 636, 시비   954)

▸2023년 :   820백만원(균특 410, 국비     0, 도비 164, 시비   246)

▸2024년이후 : 400백만원(균특 200, 국비  0, 도비  80, 시비   120)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

□ 추 진 실 적

◦ 재해위험개선지구 지정(익산시 공고 제2020-135호)	: ’20.  8.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: ’21.  6.

◦ 사전설계검토 심의(전라북도)	: ’22.  7.

◦ 공사원가심사(전라북도)	: ’22.  8.

◦ 공사 착공	: ’22. 10.

◦ 계속 공사 추진(공정률 40% : 수로정비 공사 중)	: ’23.  9.

□ 마무리 대책

◦ 계속 공사 추진	: ’23. 10.

▸수로정비, 저류지설치, 암거교설치 공사

◦ 공사 준공	: ’24. 12.

10		급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 송천지구, 성당지구, 아리랑지구, 용두산지구, 기산지구

◦ 사업규모 : 사면정비 5개소(A=17,920㎡)

◦ 총사업비 : 17,418백만원 (국 8,709, 도 3,484, 시 5,225)

사 업 명	총사업비(백만원)				사업기간
	소 계	기투자	2023년	2024년이후
총 계	17,418	6,060	2,758	8,600
송천지구	1,800	1,800	-	-	’20년~’23년
성당지구	1,500	1,500	-	-	’20년~’23년
아리랑지구	3,518	2,260	1,258	-	’21년~’24년
용두산지구	10,000	500	1,400	8,100	’22년~’25년
기산지구	600	-	100	500	’23년~’25년

□ 추 진 실 적

◦ (공사추진) 3개소 : 송천지구, 성당지구, 아리랑지구 급경사지 정비사업

▸송천(착공 ’21.10 / 공정율 75%), 성당(착공 ’21.11 / 89%), 아리랑(착공 ’22.8 / 40%)

◦ (용역추진) 2개소 : 용두산지구, 기산지구 급경사지 정비사업 실시설계

▸용두산 (착수 ’22.4 / 사전설계검토 행정안전부심의(’23.4))

▸기  산 (착수 ’23.2 / 전라북도 원가심사 준비중)

□ 마무리 대책

◦ 급경사지 정비공사 계속 추진 (3개소)

▸성당지구(’23. 12월), 송천지구(’24. 2월), 아리랑지구(’24. 8월)

◦ 실시설계용역 (2개소)

▸용두산지구(보상공고 및 공사 발주)	: ’23. 12

▸기산지구(공사구간 토지소유자 조사 및 전라북도 원가심사, 공사발주)	: ’23. 12

11		국가 비상대비 훈련 및 실용적 민방위 훈련

□ 사 업 개 요

◦ 추진방향 : 비상대비‧민방위 분야 대응태세 확립으로 시민의 생명과 재산보호

◦ 주요내용

▸비상대비 분야  : 비상대비 을지연습 실시, 통합방위협의회 개최

▸민 방 위 분야  : 민방위대 편성 및 교육, 민방위 시설·장비 확충 및 관리

* 민방위대원 12,336명 (’23. 9. 기준) : 1-4년차 5,558명, 5년차 이상 6,778명

* 민방위 시설‧장비 161개소 : 경보시설 19, 대피시설 98, 급수시설 44

□ 추 진 실 적

◦ 비상대비 훈련

▸제9585부대 혹한기 훈련 통합방위지원본부 운영   : ’23. 2. 10.

▸을지연습 전시종합상황실 운영                   : ’23. 8. 21.~8. 24.

- 비상대비정보시스템을 활용한 메시지 처리 및 상황유지

▸제9585부대 전술훈련평가 통합방위지원본부 운영  : ’23. 9. 4.

- 통합방위정보공유 체계를 활용한 메시지 처리 및 상황유지

▸익산시 통합방위협의회 3회 개최                 : 분기별 1회

◦ 민방위 편성 및 교육

▸민방위대원 편성(’23. 1. 10.기준)	: 13,589명

- 1~4년차 대원 5,970명, 5년차 이상 대원 7,619명

▸민방위 기본교육(집합,사이버) / 10,572명          : ’23. 4. 3.~6. 19.

◦ 민방위 경보시설 신규 구축 : 1개소(왕궁면 행정복지센터 옥상)

◦ 민방위 비상급수시설 관정 사후관리 실시 : 5개소(영등시민공원 등)

◦ 민방위 비상급수시설 음수기 교체                : 영등시민공원

◦ 민방위 장비 확충

▸비상대피시설 구급함 교체                        : 81개소

▸민방위 기술지원대 화생방 장비 구입    : 탐지지 1개, 제독용액 9통

▸비상대피시설 비상용품함 구입                : 8개

□ 마무리 대책

◦ 비상대비 호국훈련 통합방위지원본부 설치 운영   : ’23. 10.30.~11. 3.

◦ 민방위 보충 교육 실시(1차 및 2차 보충교육)      : ’23. 10. 6.~11.30.