도시전략사업과과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 주요성과 및 반성
□	2023 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
성장동력 구축 및 도시경쟁력 증대로 시민이 행복한 품격도시 익산 조성

		전 략 목 표
◦	도시의 상생발전을 위한 역세권 정책 개발
◦	시민과 소통‧공감하는 열린 청사 건립
◦	도시공원 일몰제 대비 공원녹지 확보

		중 점 과 제
◦	유라시아 및 환서해권을 포괄하는 호남권역 광역환승체계 구축
◦	시공품질 확보를 통한 시민친화적 신청사 건립
◦	시민들의 삶의 질 향상을 위한 명품공원 조성

일  반  현  황

□ 기          구

						도시전략사업과
역세권복합개발							신청사기획									민자개발

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12		1	4	3	3	1
현 원	12		1	4	5	2	0
증 감	-		-	-	2	△1	△1

□ 사  무  분  장

	◦	역세권 복합개발	:	KTX익산역 선상부지를 활용한 광역환승체계 구축, 익산 철도차량기지 이전 및 복합개발 추진
	◦	신청사기획	:	신청사 건립, 청사건립 재원확보 (공유지 개발, 도시재생사업 연계)
	◦	민자개발	:	도시공원 민간특례 사업 추진 (마동·모인·수도산·팔봉, 소라)

2023 예산집행실적

【 2023. 9. 22. 현재 】                                    (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시전략사업과				77,689,079	19,528,546	58,160,533	25.1
소계(일반회계)				1,546,272	51,424	1,494,848	3.3
	도시전략사업			28,460	14,548	13,912	51.1
		도시전략		28,460	14,548	13,912	51.1
			도시전략일반	28,460	14,548	13,912	51.1
	시민친화 청사건립			1,386,332	12,125	1,374,207	0.9
		신청사건립추진		1,386,332	12,125	1,374,207	0.9
			신청사건립추진	12,832	12,125	707	94.5
			지중화사업	1,373,500	0	1,373,500	0	`23.10월 집행예정
	역세권정책추진			28,000	3,877	24,123	13.8
		광역복합환승체계 수립		28,000	3,877	24,123	13.8
			광역복합환승체계 구축	28,000	3,877	24,123	13.8	2회추경 22,000
	민자개발추진			74,600	1,265	73,335	1.7
		민간공원		74,600	1,265	73,335	1.7
			민간공원조성	74,600	1,265	73,335	1.7	2회추경 66,000
	행정운영경비			28,880	19,609	9,271	67.9
		기본경비		28,880	19,609	9,271	67.9
			기본경비	28,880	19,609	9,271	67.9
소계(기 금)				76,142,807	19,477,122	56,665,685	25.6
	시민친화 청사건립			75,241,907	18,936,628	56,305,279	25.2	사고이월 2,243,498
		청사건립기금		75,241,907	18,936,628	56,305,279	25.2
			신청사건립추진(기금)	75,241,907	18,936,628	56,305,279	25.2	장기사업, 단계별집행
	재무활동(도시전략사업과)			900,900	540,494	360,406	60
		보전지출		900,900	540,494	360,406	60
			보전지출(청사건립기금)	900,900	540,494	360,406	60

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신청사 건립공사 철저한 안전관리 및 견실시공 추진(공정률 40%)

▸본청사 및 의회청사 구간 지하 2층 ~ 지상 4층 골조공사 추진

▸북측 주차장 구간 지하 2층 ~ 지붕층 골조공사 추진

◦ 도시공원 민간특례사업 공원조성 공사 추진

▸마동·수도산·모인·소라 조경·건축 공정 지속 추진

□ 반      성

◦ 물가상승,고금리,건설경기 침체로 대규모 민간 개발사업 시행시기 조율 필요

▸광역환승체계 구축 사업의 실행력 확보를 위한 단계별 사업시행

- 1단계 : 익산역 선상 및 광장을 활용한 광역복합환승체계 구축

- 2단계 : 철도차량기지 이전 및 복합개발

▸공공주도로 지역거점을 조성하는 도시재생 혁신지구 국가시범지구   공모 추진

◦ 레미콘 수급 불안, 기상 여건 등에 따른 공정 지연

▸	시멘트 공급 지연 및 운송노조 파업 등에 의한 레미콘 수급 불안, 우기 및 혹서기 작업량 조정 등에 따라 공정 지연 발생

▸적정 공기 조정 반영 및 철저한 공정관리로 견실시공 추진

◦ 지장물 미이전 및 문화재 시·발굴 조사에 따른 공원조성공사 일부공정 지연

▸토지 인도 청구 등을 통한 지장물 이전에 따른 공원 조성공사   공정율 제고

2023 주요업무결산

		KTX익산역 광역환승체계 구축
		신청사 건립공사 추진
		권역별 대규모 명품공원 조성

1		KTX익산역 광역환승체계 구축

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : KTX익산역 철도부지 및 주변지역

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2028년

◦ 사업내용

▸환서해권을 포괄하는 호남권역 광역환승체계 구축

▸익산역 철도차량기지 이전 및 철도시설 재배치

▸이전부지 복합개발(업무·상업·주거·문화·국제교류·기반시설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 민간사업자 기본구상 제안 공모 설명회	: 2023. 2. 20.

▸제시의견 : 물가상승, 고금리, 건설경기 침체로 대규모 민간 개발사업 시행 시기 조율 필요

◦ 상반기 도시재생 혁신지구 국가시범지구 공모 신청	: 2023. 5. 9.

※ 도시재생 혁신지구 공모 방식 변경으로 후보지 신청 및 사업 선정을 위해서는 사업대상지 사용 권원 확보 선행 필요

【 도시재생 혁신지구 공모 주요 변경 사항 】

◦ (공모일정) 공모 기간 명시 없이 ‘후보지 상시 공모’로 전환

◦ (공모방식) 당초 혁신지구 계획 작성, 국가시범지구 신청 이후 평가 시행에서 후보지 접수 후 기본구상 및 지구계획 공동 수립(국토부)으로 변경

◦ (신청요건) 사업대상지 사용 권원 확보

□ 마무리 대책

◦ 관련기관 협의	: 2023. 10. ~

▸공공기관 사업참여 및 익산역 광장부 권원 확보

◦ 하반기 도시재생 혁신지구 후보지 공모 신청	: 2023년 말

◦ 혁신지구 계획(안) 공동 수립 및 행정절차 이행	: 2024. ~

2		신청사 건립공사 추진

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인북로 32길 1일원(19,588㎡)

◦ 공사기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 청사규모 : 연면적 40,234㎡, 지하 2층 / 지상 10층

계	본 청	의 회	시민편의시설 등	지하주차장
40,234㎡	18,653㎡	3,386㎡	4,449㎡	13,746㎡

◦ 총사업비 : 약 948억원(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 관급자재 등)

◦ 주차시설 : 483대(지하 431대 / 지상 52대)

※ 주차타워 건립 별도 추진 : 238여대

□ 추 진 실 적

【신청사 건립】

◦ 지하 2층 ~ 지상 4층 골조공사 추진	: 2023. 1. ~ 9.

▸본청사 및 의회청사 구간 지상 3~4층 골조공사 추진 중

▸북측 주차장 구간 지붕층 골조공사 추진 중

◦ 청사 내 열린공간 인테리어 설계용역 추진	: 2023. 7. ~

▸본청사 및 의회청사 로비, 구내식당 등 세부 인테리어 설계 추진

【공유지 개발】

◦ 공유지 개발구상 및 타당성조사 용역 추진(LH)	: 2023. 2. ~

▸공유지 개발 여건 및 도입가능시설(공공성 확보방안) 분석

□ 마무리 대책

【신청사 건립】

◦ 1단계 공사(신관 건립) 완료	: ‘23.10.~‘24. 8.

◦ 청사 이전 및 2단계 공사(기존청사 철거 및 광장조성) 추진	: ‘24. 8.~‘25. 8.

【공유지 개발】

◦ 공유지 개발구상 및 타당성조사 용역 지속 추진	: 2023. 10. ~

▸도입시설 분석 및 타당성조사 자료 작성 등

◦ 공공기관 예비타당성조사 등 행정절차 추진	: 2024. 5. ~

3		권역별 대규모 명품공원 조성

◎ 약 1.6㎢ 근린공원 조성(여의도 면적의 약 55%)으로 녹색도시 실현

◎ 테마가 있는 여가 및 휴식공간 조성으로 시민들의 삶의 질 향상

◎ 신규 아파트 약 7,500세대 건립으로 주거복지 실현

□ 사 업 개 요

◦ 대상공원 : 도시공원 5개소

공원명	결정년도	결정면적 (㎡)	사업면적 (㎡)	사업시행자	추진 방식
계		1,981,893	1,630,118
마동공원	1967	267,147	239,031	㈜마동공원개발	*민간특례사업
모인공원	1958	153,145	127,150	모인파크(주)	*민간특례사업
수도산공원	1986	403,960	357,151	수도산공원개발(주)	*민간특례사업
팔봉공원	1986	892,641	697,848	팔봉공원개발㈜	*1지구-민간특례사업 *2지구-추진방식 검토중
소라공원	1967	265,000	208,938	LH	*공공지원민간임대주택 공급촉진지구

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2025년

□ 공원조성계획

공원명	공원 테마 및 주요시설
마동공원	◾청소년들이 꿈을 펼치는 교육과 체험공간 - 커뮤니티센터, 풍경서고(전통북카페), 수림재(예절체험관), 유아숲체험원 등/ 수목 식재 185,810주
모인공원	◾청춘이 One하는(하나되는) 문화놀이터 - 숲속도서관, 청년갤러리, 청년광장, 연꽃정원, 생태습지 등/ 수목 식재 162,900주
수도산공원	◾남부권 복합커뮤니티 공간 - 수영장, 복합문화센터, 산수첨경원, 민속놀이마당 등/ 수목 식재 350,370주
팔봉공원 (1지구)	◾아름다운 향, 꽃, 빛을 품은 문화플랫폼 - 팔봉노을전망대, 이리야외공연장, 기적의 놀이터, 반려동물놀이터 등/ 수목 식재 234,420주
소라공원	◾도심 속 자연이 품은 황금빛 문화공간 - 소라문화광장, 꿈꾸는 도서관, 솔밭문학마당, 실벗마당 등/ 수목 식재 243,700주

□ 추 진 실 적

◦ 공원조성공사 지속 추진(마동․모인․수도산)

▸마동공원(공정율 약 68%)

- 보도육교 도장작업 및 엘리베이터 설치 추진

- 수목식재 추진 및 조경시설물 설치 추진

- 기반시설(상·하수도 시설 및 산책로) 설치 추진

- 커뮤니티센터 및 공중화장실 건축공사 추진

- 전통건축 공사 추진

▸수도산공원(공정율 약 28%)

- 조경시설물 공사 및 공원 내 가이식 수목 정식 추진

- 공원 내 도로 소로 1-2호선 확장공사 지속 추진

- 수영장 건축공사 지속 추진

▸모인공원(공정율 약 12%)

- 식재수목 사전 검수작업 추진

- 공원 내 토공 작업 지속 추진

- 공원 내 도서관․화장실 건축공사 추진

◦ 협의보상 지속 추진(팔봉 1지구)

◦ 공원별 토지 기부채납 현황

▸마  동  공 원 : 274필지, 171,492㎡, 기부율 99.78%

▸수도산공원 : 375필지, 264,161㎡, 기부율 96.46%

▸모 인 공 원 : 182필지,  85,854㎡, 기부율 92.13%

※ 국유지 매입완료 후 기부채납 완료 예정

◦ 익산소라 공공지원민간임대주택 공급촉진지구

▸공원조성공사 추진 (공정율 약 34%)

- 부지경계 가설휀스 설치 및 토공작업 추진

- 지장물 철거 및 문화재 시굴·발굴 조사

□ 마무리 대책

◦ 도시공원 민간특례사업 추진(마동․모인․수도산)	: 2023. 10.~

▸공원조성공사 추진(마동·모인·수도산)

- 수도산(2024. 4.), 마동(2024. 5.), 모인(2024. 7.)

◦ 도시공원 민간특례사업 추진(팔봉1지구)	: 2023. 10.~

▸협의보상 지속 추진

◦ 익산소라 공공지원민간임대주택 공급촉진지구	: 2023. 10.~

▸지장물 철거 완료 및 기반시설 설치 추진 및 조경공사 착수

▸사업시행자 공모(임대 1,090세대) 선정	: 2023. 10.