건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 주요성과 및 반성
□	2023 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 밝고 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모

일  반  현  황

□ 기          구

					건설과
도로시설			도로기반					하천시설				하천관리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19		1	4	7	4	3
현 원	20 (정원외 1)		1	5	5 (정원외 1)	4	5
증 감	1		-	1	△2	-	2

□ 사  무  분  장

	◦	도로시설	:	시·군도 및 농어촌도로 확·포장사업, 철도건널목개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 소유권 이전등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등 업무지원
	◦	도로기반		주민숙원사업, 마을안길 정비공사, 비법정도로 확포장공사, 안전한 보행환경사업, 교통사고 잦은곳 개선사업
	◦	하천시설	:	하천기본계획수립, 지방하천환경정비사업, 소하천정비사업
	◦	하천관리	:	하천유지관리(국가,지방,소하천), 용안생태습지유지관리 만경강 친수시설 유지관리, 하천점용허가 및 골재채취허가

□ 도 로 현 황

(단위 : ㎞, %)

구 분	계	시 도	군 도	농어촌도로
노 선 수	1,539	1,264	23	252
연장	1,184.2	461.2	201	522
확포장	688.9	370	118.4	200.5
포장률	58.2	80.2	58.9	38.4

□ 하 천 현 황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비 대상	개수 연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	331.623	85	313.663	331.623	163.787	167.836	49.3%
국가하천	3	42.19	3	42.19	42.19	42.19	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49.3%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	29.187	73.016	28.5%

□ 하천점용허가 현황

(단위 : 필지, ㎡ )

필 지 수				면 적
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
1,276	424	-	852	2,993,200	230,757	-	2,762,443

□ 차량보유 현황

하천관리차량

94버6749 전기1톤트럭 1대,  오토바이 1대

2023 예산집행실적

【 2023. 9. 22. 현재 】                                     (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				50,585,180	23,130,733	27,454,447	45.7
	도로시설관리			27,703,048	11,010,199	16,692,849	39.7
		시군농어촌도로확포장		6,990,325	2,029,242	4,961,083	29
			금마 갈산-서편간 도로확포장공사	547,193	273,581	273,612	49.9	토지보상지연 명시 417,193
			삼성 하나로 외화간 도로확포장공사	77,882	30,673	47,209	39.4	토지보상지연 명시 77,882
			미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	51,078	48,922	51.1
			군도 23호선 도로 확포장공사	39,797	1,465	38,332	3.7	11월 준공 사고 39,797
			시군도 도로관리계획 및 농어촌도로 기본계획 용역	70,776	0	70,776	0	12월 준공 사고 70,776
			어양동 어곳~부평간 도로확포장	1,121,269	392,195	729,074	35	10월준공(1공구) 명시 450,000 사고 371,269
			오산면 소재지 진입도로 확포장공사	118,804	67,316	51,488	56.7	토지보상지연 명시 118,804
			황등 도선-외화간 도로 확포장공사	229,577	82,022	147,555	35.7	9월 준공 명시 229,577
			하나로~소간촌간 도로 확포장공사	460,520	221,295	239,225	48.1	11월 기성집행 명시 460,520
			춘포 창평마을 진입도로 확포장공사	100,000	47,972	52,028	48	토지보상지연 명시 100,000
			왕궁 금오동-군도22호간 도로 확포장공사	100,000	2,478	97,522	2.5	11월 기성집행
			금마 신정-중왕간 도로 확포장공사	599,676	219,604	380,072	36.6	토지보상지연 명시 249,676
			춘포 오룡선 도로확포장	215,065	109,295	105,770	50.8	11월준공(1공구) 명시 215,065
			황등면 하동마을~동연 지하차도 도로 개설공사	397,922	16,405	381,517	4.1	설계용역중(11월) 명시 97,922
			춘포 노적선 도로확포장공사	790,085	157,654	632,431	20	11월 기성집행 사고 140,085
			백제왕도 탐방로 조성 (익산토성)	168,090	43,663	124,427	26	11월 준공 사고 168,090
			망성 신하선 도로확포장공사	416,000	0	416,000	0	설계용역중(11월) 명시 66,000
			오산 용연선(모현동장례식장~용곤마을)도로확포장 사업	100,000	46,719	53,281	46.7	토지보상지연 사고 100,000
			함라 행진선 도로확포장	382,669	201,628	181,041	52.7	토지보상지연 명시 382,669
			삼기 만대선(하나로~검지마을) 도로확포장공사	80,000	11,620	68,380	14.5	설계용역중(11월) 명시 80,000
			금마 농도303호 종구선 도로확포장공사	150,000	47,579	102,421	31.7	설계용역중(11월) 명시 150,000
			함라 천남길 도로확포장공사	100,000	0	100,000	0	설계용역중(12월)
			시군농어촌도로 확포장사업 추진	5,000	5,000	0	100
			낭산 맹동마을~용성초교 도로확포장공사	20,000	0	20,000	0	2회추경 설계용역중(12월)
			국립 익산 치유의 숲 진입도로 확포장공사	200,000	0	200,000	0	2회추경 설계용역중(12월)
			황등 상동선 도로개설공사	400,000	0	400,000	0	2회추경 설계용역중(11월)
		지방도 도로확포장		386,391	83,269	303,122	21.6
			하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	386,391	83,269	303,122	21.6	토지보상지연 명시 386,391
		철도건널목개량사업		203,183	8,861	194,322	4.4
			평화육교재가설	203,183	8,861	194,322	4.4	사고 203,183
		주민숙원사업		32,920	13,680	19,240	41.6
			주민숙원사업	32,920	13,680	19,240	41.6	월별 집행예정
		교통관리개선사업		1,953,106	342,486	1,610,620	17.5
			성당 삼회선 도로구조개선사업	381,725	11,356	370,369	3	토지보상지연 사고 281,725
			낭산~시명 선형개량사업(전환사업)	241,381	232,154	9,227	96.2	사고 241,381
			장암사거리 회전교차로 설치	50,000	3,491	46,509	7	설계용역중(11월) 토지보상지연
			낭산~시명 선형개량사업	100,000	95,485	4,515	95.5
			함열 상마사거리 회전교차로 설치	300,000	0	300,000	0	설계용역중(11월) 토지보상지연
			황등 상다선 선형개량(전환사업)	80,000	0	80,000	0	설계용역중(11월) 토지보상지연
			여산 두여삼거리 회전교차로 설치공사	400,000	0	400,000	0	2회추경 설계용역중(12월) 토지보상지연
			웅포 송천사거리 회전교차로 설치공사	400,000	0	400,000	0	2회추경 설계용역중(12월) 토지보상지연
		소규모주민숙원사업		7,982,329	3,310,510	4,671,819	41.5
			소규모주민숙원사업	778,220	578,550	199,670	74.3
			마을안길 노후도로 정비공사	6,252,894	2,043,134	4,209,760	32.7	추경편성 ‘23.하반기 추진 명시 440,000 사고 135,144
			지역밀착형참여사업(마을안길)	478,502	312,846	165,656	65.4	명시 173,590 사고 31,912
			(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	472,713	375,980	96,733	79.5	명시 472,713
		위험도로개선		1,467,655	184,185	1,283,470	12.5
			교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)	1,467,655	184,185	1,283,470	12.5	추경편성 ‘24.6월 준공 명시 577,655
		국도 도로확포장		8,687,139	5,037,966	3,649,173	58
			국도27호 대체우회도로(서수~평장2)건설공사	7,687,139	5,037,966	2,649,173	65.5	중토위 수용재결 명시 487,139
			국도27호 대체우회도로(서수~평장1)건설공사	1,000,000	0	1,000,000	0	2회추경 토지보상지연
	도로기반유지			500,000	0	500,000	0
		소규모주민숙원사업		500,000	0	500,000	0
			남부권 순환형 힐링 보행로 조성	300,000	0	300,000	0	‘23.10월 발주 예정 명시 300,000
			자연재난 응급복구(마을안길)	200,000	0	200,000	0	추경 (‘23.10월 발주 예정)
	하천정비			22,244,705	12,012,716	10,231,989	54
		하천정비및유지관리		22,244,705	12,012,716	10,231,989	54
			지방하천정비(왕궁천)(전환사업)	6,467,518	5,325,086	1,142,432	82.3	총사업비 조정 및 준공정산 계속 1,467,518
			지방하천정비(동면천)(전환사업)	6,199,552	2,858,327	3,341,225	46.1	2차분 준공(12월) 계속 3,199,552
			소하천정비(진사천)(전환사업)	1,292,879	297,384	995,495	23	기성(12월) 명시 1,210,324 사고 82,555
			소하천정비(황각천)(전환사업)	1,345,058	14,000	1,331,058	1	착공(11월) (문화재 현상변경 허가 등 협의 지연) 명시 145,058
			하천제방 유지보수(자체)	3,352,980	2,057,124	1,295,856	61.4	명시 115,000
			하천제방 유지보수	1,320,000	1,018,163	301,837	77.1
			국가하천유지보수(4대강)	464,000	260,378	203,622	56.1
			국가하천유지보수(4대강외)	283,000	71,212	211,788	25.2	공사중 (풀깎기 준공 10월)
			만경강 문화관	157,945	97,142	60,803	61.5
			국가하천 만경강 파크골프장 증설사업	880,773	13,900	866,873	1.6	착공 ‘23. 9, 준공 ’24. 5. 명시 880,773
			대조 재해위험 개선지구 정비사업	20,000	0	20,000	0	용역완료(12월) (행정절차 협의중)
			만경강 파크골프장 화장실 기능보강	30,000	0	30,000	0	하천점용 허가 중
			소하천 자동 수위계측시스템 설치	140,000	0	140,000	0	설치완료(12월) (행정절차 협의중)
			자연재난 응급복구(지방하천)	291,000	0	291,000	0	추경 (‘23.10.착공)
	재무활동(건설과)			2,300	2,132	168	92.7
		보전지출		2,300	2,132	168	92.7
			보전지출	2,300	2,132	168	92.7
	행정운영경비(건설과)			135,127	105,686	29,441	78.2
		인력운영비		101,817	80,802	21,015	79.4
			국가하천유지보수(인력운영비)	48,000	40,976	7,024	85.4
			만경강 문화관(인력운영비)	53,817	39,826	13,991	74
		기본경비		33,310	24,884	8,426	74.7
			기본경비	33,310	24,884	8,426	74.7

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 시군도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민편익 증대

‣하나로~소간촌간 도로확포장공사(L=0.6km,B=8.0m) 착공	: 2023.  3.

‣춘포 노적선 도로확포장공사(L=0.4km,B=8.0m) 착공	: 2023.  3.

‣춘포 오룡선 도로확포장공사(L=0.5km,B=8.0m) 착공	: 2023.  4.

‣낭산~시명간 선형 개량사업 공사(L=0.4km,B=8.0m) 준공	: 2023.  8.

‣왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장공사(L=0.55km,B=8.0m) 착공	: 2023.  9.

‣황등도선~외화간 도로확포장공사(L=0.4km,B=8.0m) 준공	: 2023.  9.

‣어양어곳~부평간 도로확포장공사(1공구)(L=0.4km,B=8.0m) 준공	: 2023. 10.

◦ 토지수용재결 추진으로 공익사업 추진

‣춘포 노적선 도로확포장공사 수용재결 완료	: 2023. 8.

‣익산시관내 국도대체우회도로(서수~평장2)건설공사 수용재결 추진	: 2023. 9.

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

‣생활여건개선을 위한 주민숙원사업 공사추진 및 완료	: 177건

◦ 지방하천 정비사업을 통한 재해예방 및 친수공간 조성

‣왕궁천 지방하천 정비공사(2지구) 공사 완료	: 2023. 6.

‣동면천 지방하천 정비공사(2차분) 공사 추진	: 2023. 7.~

□ 반      성

◦ 황각소하천 정비사업 행정절차 이행에 따른 기간소요로 공사 착공 지연

‣행정절차 및 편입토지 협의 보상을 병행실시하여 하반기에 공사가 착공될 수 있도록 최선을 다하겠음

2023 주요업무결산

		시·군도 및 농어촌도로 확포장 서수~평장간 국도대체우회도로 개설 생활여건개선을 위한 주민숙원사업 지방하천 왕궁천 정비사업 지방하천 동면천 정비사업 진사소하천 정비사업 황각소하천 정비사업 만경강 친수시설 유지관리 금강 용안생태습지 유지관리 하천제방 유지관리

1		시·군도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업규모 : 26개사업 L=16.66km, B=8.0-24.0m

◦ 총사업비 : 44,029백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투자	2023년	2024년이후	비 고
44,029	9,348	7,656	27,025

□ 추 진 실 적

◦ 공사 추진 9개소	: 2023.  1. ~ 9.

‣시도 1개소, 군도 2개소, 농어촌도로 6개소 노선

◦ 공사 준공 3개소

시도	군도	농어촌도로
어양어곳~부평간 도로(1공구)(23.10)	낭산~시명간 선형개량(23.8)	황등도선~외화간 도로(23.9)

◦ 보상협의 추진 7개소	: 2023.  1. ~ 9.

‣시도 1개소, 군도 1개소, 농어촌도로 4개소, 미지정 1개소 노선

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 11개소	: 2023.  1. ~ 9.

‣군도 2개소, 농어촌도로 6개소, 지방도 1개소, 미지정 2개소 노선

◦ 군도·농어촌도로 기본계획(변경) 수립용역	: 2023.  1. ~ 9.

‣전략환경영향평가 협의중(전북, 환경청)

□ 마무리 대책

◦ 공사 중 7개소	: 2023.  10.~

‣시도 1개소, 군도 1개소, 농어촌도로 5개소 노선

◦ 보상협의 추진 7개소	: 2023.  10.~

‣시도 1개소, 군도 1개소, 농어촌도로 4개소, 미지정 1개소 노선

◦ 실시설계용역 및 행정절차 추진 11개소	: 2023.  10.~

‣군도 2개소, 농어촌도로 6개소, 지방도 1개소, 미지정 2개소 노선

◦ 군도·농어촌도로 기본계획(변경) 수립용역 완료	: 2023. 12.

2023년도 노선별 사업 추진 현황

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년

◦ 사업개요 : 도로확포장 L=16.66km, B=8.0~24.0m

◦ 총사업비 : 26개사업 / 44,029백만원(2023년 예산 7,656)

◦ 노선별 추진상황

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	23년 예산액	24년 이후
계	26개 사업			L=16.66km B=8.0~24.0m	44,029	9,348	7,656	27,025
공 사 (7)	시도 (1)	1268호	어양어곳~부평간 도로확포장	L=0.8km B=8.0m	3,100	1,779	1,121	200	2공구
	군 도 (1)	7호	성당삼산마을 회전교차로	회전교차로	400	18	382	-	10% (수용재결)
	농 어 촌 도 로 (5)	금마101호 (서삼선)	금마갈산~서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,759	1,362	547	850	80%
		춘포311호 (노적선)	춘포노적선 진입도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,300	510	790	-	60%
		삼기203호 (석라선)	하나로~소간촌간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	3,400	640	460	2,300	25%
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	110	215	1,175	20%
		왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동~군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	200	100	700	15%
보 상 (7)	시 도 (1)	1201호	삼성하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,780	1,152	78	2,550	65%
	군 도 (1)	2호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.85km B=24.0m	5,000	1,982	118	2,900	63%
	농 어 촌 도 로 (4)	금마202호 (서오선)	금마신정~중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	2,450	651	599	1,200	55%
		춘포308호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,400	40	100	1,260	분할측량 완료
		함라301호 (행진선)	함라행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	118	382	1,570	40%
		망성201호 (신하선)	망성신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	1,000	34	416	550	토지소유자 의견청취 공고
	미지정 (1)		황등하동~ 동연지하차도 도로확포장사업	L=0.63km B=8.0m	1,250	502	398	350	43%

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	23년 예산액	24년 이후
실 시 설 계 (11)	군 도 (2)	8호	장암사거리 회전교차로	회전교차로	500	-	50	450
		13호	여산 두여삼거리 회전교차로 설치	회전교차로	500	-	400	100	도비50%
	농 어 촌 도 로 (6)	함열101호 (박전선)	함열상마사거리 회전교차로	회전교차로	500	-	300	200	도비50%
		금마303호 (종구선)	금마종구선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,500	-	150	1,350	-
		오산301호 (용연선)	오산용연선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	2,400	-	100	2,300	-
		삼기208호 (만대선)	삼기만대선 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	-
		황등102호 (상다선)	황등상다선 도로선형개량	L=0.30km B=8.0m	1,200	-	80	1,120	도비50%
		낭산101호	낭산 맹동마을~용성초교 도로확포장	L=0.2km B=8.0m	500	-	20	480
	지방도 (1)	724호	웅포 송천사거리 회전교차로설치	회전교차로	500	-	400	100	도비50%
	미지정 (2)		국립 익산 치유의 숲 진입도로확포장	L=1.1km B=8.0m	3,500	-	200	3,300
			함라천남길 도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,000	-	100	900
기 타 (1)			군도 도로관리계획 및농어촌도로기본 정비계획수립용역	1식	320	250	70	-	-

2		서수~평장간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

◦ 사업기간 : 2021. ~ 2028.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 3,242억원(국 3,075 시 167)

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2023년	2024년이후	비 고
계	3,242	344	350	2,548
국 비	3,075	339	300	2,436
시 비	167	5	50	112	1공구 85 2공구 82

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청(익산시 → 동지역 토지보상)

‣공사 공정율 : 7%

‣토지 보상율 : 1공구(감정평가 진행중), 2공구(67%)

□ 추 진 실 적

◦ 업무협약체결(동지역 토지보상)	: 2022. 5. 13.

◦ 황등지역 집단민원 구간 관계기관 협의(1공구)	: 2022. 5. 23.

◦ 1공구 도로구역결정 주민의견청취 공고	: 2022. 6. 20.

◦ 2공구 동지역 보상계획 공고(47필지, 41,887㎡)	: 2022. 6. 28.

◦ 1공구 동지역 보상계획 공고(107필지, 63,589㎡)	: 2023. 5.  4.

□ 마무리 대책

◦ 2공구 동지역 수용재결 신청	: 2023. 10.

◦ 1공구 동지역 감정평가 및 보상협의	: 2023. 10. ~

3		생활여건개선을 위한 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.

◦ 사업대상 : 292건

사 업 명	사 업 량(건)	사 업 비(백만원)	비 고
합 계	292	9,749
소규모주민숙원사업	91	778
마을안길노후도로정비	176	6,252
지역밀착형참여사업(마을안길)	15	478	(도비 100%)
교통사고 잦은곳 개선사업	8	1,468	(도비 50%)
(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성사업	1	473
남부권 순환형 힐링보행로 조성	1	300

□ 추 진 실 적

◦ 생활여건개선을 위한 공사추진 및 완료	: 177건(60%)

‣소규모 주민숙원사업 : 함열읍 장구1마을 외 68건(75%)

‣마을안길 노후도로정비 : 함열읍 삼양마을 외 90건(45%)

‣지역밀착형참여사업(마을안길) : 황등면 후생1마을 외 12건(86%)

‣교통사고 잦은곳 개선사업 : 영등동 귀금속사거리 외 2건(38%)

‣(구)농업진흥원 일원 힐링보행로 조성사업 완료 : 1건(100%)

‣남부권 순환형 힐링보행로 조성사업 : 실시설계용역 중

□ 마무리 대책

◦ 잔여 생활여건개선사업 115건 설계 및 발주 시행

‣소규모 주민숙원사업 22건 시행	: 2023. 10. ~ 12.

‣마을안길 노후도로정비 85건 시행	: 2023. 10. ~ 12.

‣지역밀착형참여사업(마을안길) 2건 시행	: 2023. 10. ~ 2024. 3.

‣교통사고 잦은곳 개선사업 5건 시행	: 2023. 10. ~ 2024. 6.

‣남부권 순환형 힐링보행로 조성사업 시행	: 2023. 10. ~ 2024. 3.

4		지방하천 왕궁천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리(보석박물관)~춘포면 천동리(익산천 합류점)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2023. 11.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=17.9km, 노후교량 재가설 9개소 등

◦ 총사업비 : 47,368백만원 (국 23,684 도 9,474 시 14,210)

(단위 : 백만원)

공구별	총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년이후
계	47,368	40,696	5,000	1,672
1지구	23,693	23,693	-	-
2지구	23,675	17,003	5,000	1,672

▸2023년 예산액 : 5,000백만원 (도 3,500 시 1,500)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 추진	: 2015. 6. ~ 2018. 12.

◦ 왕궁천(1지구) 공사 추진(완료)	: 2019. 3. ~ 2022.  8.

‣위    치 : 흥암교 ~ 익산천 합류점(하류)

‣공사내용 : 축제 및 보축(L=4.62km), 교량재가설(5개소)

◦ 왕궁천(2지구) 공사 추진(완료)	: 2020. 3. ~ 2023.  6.

‣위    치 : 흥암교 ~ 보석박물관(상류)

‣공사내용 : 축제 및 보축(L=4.63km), 교량재가설(4개소)

□ 마무리 대책

◦ 총사업비 변경 및 준공정산(전라북도)	: 2023. 11.

‣사업 완료에 따라 2024년 예산(1,672백만원)은 총사업비 조정시 사업간 조정(왕궁천→동면천)으로 변경 예정

5		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리(국가식품클러스터) ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축(L=6.1㎞), 교량 재가설(7개소) 등

◦ 총사업비 : 17,317백만원(국 8,658 도 3,464 시 5,195)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년이후
17,317	4,659	6,481	6,177

‣2023년 본예산액 : 3,000백만원 (도 2,100 시 900)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 추진	: 2017. 7. ~ 2021. 12.

◦ 동면천(1차분) 공사 추진(완료)	: 2022. 9. ~ 2023.  7.

‣공사내용 : 축제(1km), 교량 2개소(파일항타), 구조물공(배수통관 6개소) 등

◦ 동면천(2차분) 공사 추진	: 2023. 7. ~

‣동면4교, 동면5교 공사 진행중(공정률 32%)

□ 마무리 대책

◦ 동면천 하천정비공사(2차분) 준공	: 2024. 2.

◦ 동면천 하천정비공사(3차분) 추진	: 2024. 3. ~ 12.

6		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원(가람문학관)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.687㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6㎞, 교량 재가설 6개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,500백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,066)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년 이후
1,500	207	1,293	0

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 추진	: 2021.  3. ~ 2022.  4.

‣주민설명회(2차), 공공디자인 및 설계심의 완료

◦ 공사 착공	: 2022.  6.

‣공사 중지(편입토지 보상 등 행정절차 이행 : 2022. 7.)

◦ 편입토지 등 감정평가 및 보상협의	: 2022.  7. ~

◦ 관계 기관(부서) 협의 완료	: 2023.  5.

‣농지전용, 문화재 현상변경, 중앙토지수용위원회 사업인정 협의 등

◦ 공사 재착공	: 2023.  8. ~

‣토공 및 석축헐기 기초공사 진행중(공정률 30%)

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

7		황각소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 신용리 123-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.753㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축, 교량 재가설 등

◦ 총사업비 : 2,000백만원(설계 150, 보상 350, 공사 1,500)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2023년도	2024년 이후
2,000	55	1,345	600

‣2023년 예산액 : 1,200백만원 (시비 100%)

□ 추 진 실 적

◦ 토질조사용역(교량가설지역)	: 2022.  2. ~ 3.

◦ 실시설계용역 착공(공정률 80%)	: 2022.  3.

‣주민설명회(2차), 공공디자인 심의 완료

‣용역 중지중 (설계심의 등 행정절차 이행 : 2022. 8. 29.)

◦ 소규모환경영향평가 용역	: 2022.  9. ~ 2023. 4.

◦ 설계심의 및 관련부서 협의	: 2023.  8. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 설계심의 등 행정절차 완료 및 실시설계용역 준공	: 2023. 10.

◦ 황각소하천 정비공사 발주 및 착공	: 2023. 11.

◦ 황각소하천 정비공사 준공	: 2024. 12.

8		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=18km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 위    치 : 6개지구(신지, 목천, 춘포, 화전, 반월, 마산)

◦ 주요시설

‣자전거도로(21.71km), 파크골프장(50,000㎡), 축구장, 인라인장 등

‣만경강문화관 : 1층(제1전시관, 로비 등)/2층(제2·3전시관, 수유실 등)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 친수시설관리, 제초, 만경강 문화관 운영 등

◦ 총사업비 : 710백만원 (국 283 도 30 시 397)

□ 추 진 실 적

◦ 친수시설 유지관리	: 2023.  1. ~ 9.

‣볼라드 설치(28개소), 차단기 설치(2개소)

‣만경강 제방, 산책로, 자전거도로 제초

◦ 만경강 문화관 운영	: 2023.  1. ~ 9.

‣친환경 제품 만들기 등 「환경생각 프로젝트」 운영

‣해설과 함께 하는 플로깅(줍깅)/31명, 인문학 특강/50명

‣관람인원(총 11,228명 : 개인 9,648명, 단체 1,580명)

◦ 하천구역 내 불법점용시설물(텐트, 카라반 등) 계도 10건	: 2023.  2. ~ 9.

◦ 만경강 환경정비사업 추진(1~6차)	: 2023.  3. ~ 9.

‣쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등

□ 마무리 대책

◦ 만경강 친수시설 유지관리, 환경정비사업	: 2023.  10. ~ 11.

◦ 만경강 제방, 산책로, 자전거도로 제초	: 2023.  10. ~ 11.

◦ 만경강 문화관 운영(문화·기획·방학 프로그램)	: 2023.  10. ~ 12.

9		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 주요시설 : 축구장 1면, 족구장 2면, 주차장, 산책로, 화장실 2개소,
찰데크 및 생태습지 6개소 등

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초, 노후시설물 보수, 수목 및 초화류 보식 등

◦ 총사업비 : 1,005백만원 (국 512 시 493)

□ 추 진 실 적

◦ 금강 용안생태습지 환경정비사업 추진(1~6차)	: 2023. 3. ~ 9.

‣쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등

◦ 친수시설 유지관리	: 2023. 3. ~ 9.

‣산책로 개설(L=76m, B=2.5m), 산책로 및 제방 정비

‣데크 및 난간 보수(L=50m), 안내판 정비(31개소), 산책로 풀깎기(L=9.5km)

◦ 시설물 정비	: 2023. 8. ~ 9.

▸너와정자 23개소, 로프난간 L=580m, 고무블럭 20㎡, 화장실 2개소 등

◦ 초화류 파종 및 식재	: 2023. 8. ~ 9.

‣가우라 18,000본, 아스타 1,000본, 리빙스턴데이지 17,640본, 구절초 3,975본

‣코스모스 16,700㎡, 해바라기 800㎡, 꽃잔디 64,800본, 아스타 72,850본, 가을꽃(매리골드, 살비아) 8,800본

□ 마무리 대책

◦ 국화 식재(국화축제 후)	: 2023. 10.

◦ 금강 용안생태습지 환경정비	: 2023. 10. ~ 11.

◦ 친수시설 유지관리 추진	: 2023. 10. ~ 11.

‣목재데크, 광장, 화장실, 파고라 등 유지보수

10		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

‣하천준설 : 오동정천 하천준설공사 외 8건, 민원처리 등

‣제방포장 및 보수·보강 : 강경천 제방포장공사 외 6건, 민원처리 등

‣제초 및 예초 : 제방 제초작업 및 수목제거 등

‣안전점검 : 하천시설물 16개소 정기안전점검(상반기·하반기 실시)

‣지방하천 및 소하천 환경정비사업

◦ 총사업비 : 3,272백만원(도 660 시 2,612)

□ 추 진 실 적

◦ 오동정천 외 8개소 하천준설 및 갈전천 수목제거	: 2023.  1. ~ 6.

◦ 지방하천 및 소하천 환경정비(1~6차)	: 2023.  3. ~ 9.

‣쓰레기줍기, 예초, 제초, 화장실 청소 등

◦ 익산천 외 5개소 제방포장(L=1,060m) 완료	: 2023.  5. ~ 8.

◦ 하천시설물 16개소 정기안전점검 완료(상반기)	: 2023.  6.

◦ 하천 응급복구(탑천 외 8건)	: 2023.  7. ~ 8.

□ 마무리 대책

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리, 환경정비사업	: 연 중

◦ 하천 준설, 제방 보수·보강(오산천, 성당내난천)	: 2023. 10. ~ 11.

◦ 제방 및 호안 제초·예초	: 2023. 10. ~ 11.

◦ 하천시설물 정기안전점검(하반기)(만경강, 강경천, 왕궁천)	: 2023. 10. ~ 11.