상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 주요성과
□	2023 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 ‘다이로움 water’공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정 운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 스마트 미터 사업을 통한 유수율 제고 및 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	6	15	9	8	2
현 원	42	1	1	11	19	5	3	2
증 감				5	4	△4	△5

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원					임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민 단체	기관
10	2	1	2	4	1	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	270,993	269,909	99.6
도심권	216,512	216,478	99.9
읍면권	54,481	53,431	98.0

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	151,488
생 활 용 수	소 계	195,300	131,593	100%
	광 역	105,300	77,877	59.2%
	자 체	90,000	53,716	40.8%
공 업 용 수	자 체	35,000	19,895

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,614	3,335,539	100.0
가 정 용	48,159	1,623,288	48.7
일 반 용	15,488	576,267	17.3
대 중 탕 용	39	15,428	0.5
산 업 용	828	524,820	15.7
전용공업용	100	595,736	17.8

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,951.7	2.5	25.3	1,200.3	723.6

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2023 예산집행실적

【 2023. 9. 22. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				52,229,165	35,575,269	16,653,896	68.1
	상수도공기업관리(사업)			22,171,047	14,478,094	7,692,953	65.3
		상수도사업관리(사업)		22,171,047	14,478,094	7,692,953	65.3
			원수 및 취수비	14,597,777	10,398,526	4,199,251	71.2
			정수비	3,032,193	1,951,581	1,080,612	64.4
			배·급수비	1,110,850	618,260	492,590	55.7
			신설공사비	2,035,750	791,020	1,244,730	38.9
			개조공사비	95,290	32,975	62,315	34.6
			징수 및 수용가관리비	1,299,187	685,732	613,455	52.8
	행정운영경비			5,496,960	4,007,328	1,489,632	72.9
		인력운영비		5,197,773	3,810,244	1,387,529	73.3
			인력운영비	5,197,773	3,810,244	1,387,529	73.3
		기본경비		299,187	197,084	102,103	65.9
			기본경비	299,187	197,084	102,103	65.9
	예비비			50,000	0	50,000	0
		예비비		50,000	0	50,000	0
			예비비	50,000	0	50,000	0
	상수도공기업관리(자본)			24,157,757	17,087,139	7,070,618	70.7
		상수도사업(자본)		24,157,757	17,087,139	7,070,618	70.7
			정수장 시설물 사업추진	1,427,560	577,450	850,110	40.5	건설개량 420,132천원
			유수율 제고사업 추진	2,050,700	1,592,837	457,863	77.7	건설개량 45,700천원
			상수도 지하시설물 지반탐사	45,600	39,650	5,950	87.0
			급수구역내 급배수관 확장공사	1,132,465	472,765	659,700	41.7	건설개량 39,054천원
			소규모 배수관시설 (급수불출) 민원사업	952,375	904,097	48,278	94.9
			검침 부적합 옥내 계량기 이설공사	70,000	33,343	36,657	47.6
			폐전 수도관 본관 단수공사	100,000	32,799	67,201	32.8
			소규모 간이급수시설 유지보수	10,000	9,383	617	93.8
			상수도 부설도로 노면정비공사	576,437	436,404	140,033	75.7
			금마배수지 확충공사	2,708,763	1,914,797	793,966	70.7	건설개량 1,086,000천원 사고이월 193,763천원
			정수장 시설비	147,150	90,848	56,302	61.7
			자산취득비	14,212	14,155	57	99.6
			자치단체등자본이전	10,208,000	6,300,000	3,908,000	61.7
			지방상수도 스마트 관망관리 인프라구축 (스마트미터)	4,714,495	4,668,611	45,884	99.0	사고이월 4,714,495천원
	재무활동			2,708	2,708	0	100
		보전지출		2,708	2,708	0	100
			자치단체등자본이전	2,708	2,708	0	100
	예비비(자본)			350,693	0	350,693	0
		예비비(자본)		350,693	0	350,693	0
			예비비(자본)	350,693	0	350,693	0

2023 주요성과

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

‣ 노후상수도 정비사업

- 블록시스템 구축공사 및 우선 관망 정비공사 추진, 누수탐사 용역 추진

‣ 스마트 지방상수도 지원사업 : 시설공사 추진(2차분)

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 5개소 3.2km/503개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 : 156개소

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

‣ 2023년 부과/징수 : 18,236백만원/18,020백만원(징수율 98.8%)

‣ 체납 징수반 편성·운영, 체납독려 및 단수조치, 징수 책임제 시행

◦ 상수도요금 현실화 추진

‣ 2023년 11월 고지분부터 ~ 2028년까지 5차에 걸쳐 8.1%씩 인상

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 : 6개소 3.2km / 급 ·배수관 개선공사 : 329개소

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 710건, 수용가 옥내누수 탐사 705건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 38개소 8.7km

‣ 누수처 신고 포상금제 운영으로 신속 복구 : 61개소/655,000원

□ 반      성

◦ 춘포면 갈전마을 배수관부설공사 추진 지연

‣ 주민간 협의 지연 등으로 배수관부설공사 추진이 늦어졌으나 당해 연도 내  준공하도록 노력하겠음

2023 주요업무결산

		지방상수도현대화사업 <노후상수도정비, 스마트 관망관리 구축) 상수도 지하시설물 지반탐사 용역 금마배수지 확충 공사 급수구역 확장 및 급·배수관 개선공사 상수도요금 현실화 상수도요금 부과ㆍ징수 깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 관리 신흥정수장 차염설비 설치공사 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사 업 비 : 66,493백만원

▸노후상수도 정비사업 : 60,586백만원(국비 50%, 도 10%, 시 40%)

- 2023년 사업비: 12,013백만원(2021년 12,080백만원, 2022년 15,125백만원)

※ 국비 6,007백만원, 도비 1,201백만원, 시비 4,805백만원(미확보액 2,896백만원)      ▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 5,907백만원(국비 70%, 시 30%)

◦ 사업내용

▸노후관교체(L=70.9㎞) 및 블록시스템구축(53개소)

▸정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 유량수압 감시 시스템 등

□ 추 진 실 적

◦ 노후상수도 정비사업

▸블록고립 및 운영 시행                           : 2023. 1. ~ 9.

- 신흥급수구역 14개 소블록 중 12개 완료 및 운영

▸유지관리 시스템 구축 용역 착공                  : 2023. 3.

- 용역사 / 용역비 : ㈜싸이몬 외 1개사 / 4,752백만원

▸블록시스템 구축공사 착공(총 53개소 중 신흥블록 제외 39개소)	: 2023. 5.

- 시공사 / 공사비 : (유)산하종합건설 / 3,842백만원

▸노후관 교체 공사 착공(우선사업대상지(중앙동 14㎞))	: 2023. 7.

- 시공사 / 공사비 : ㈜상현건설 / 4,685백만원

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸시설공사(2차분) 추진	: 2023. 1. ~ 9.

- 시설공사 추진(정밀여과장치(6개소), 자동드레인(6개소), 유량수압 감시 시스템(16개소))

□ 마무리 대책

◦ 노후상수도 정비사업

▸블록시스템 구축공사 준공	: 2023. 1. ~ 2024. 12.

▸유지관리 시스템 구축 준공	: 2023. 3. ~ 2024. 12.

▸상수도관망 정비공사(노후관 교체) 준공	: 2023. 5. ~ 2024. 12.

- 신흥 급수구역 내 노후관 교체(L=70.9km, 사업비 250억원)

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축

▸시설공사(2차분) 준공	: 2023. 12.

2		상수도 지하시설물 지반탐사 용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역기간 : 2023. 3. ~ 2023. 9.

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 용 역 비 : 40백만원

◦ 용역내용

▸직경 500mm 이상의 상수도관 매설 지반에 대하여 지표투과레이더(GPR) 탐사를 통한 공동(空洞)구 조사 (L=28.5km)

◦ 관계법령

▸「지하안전관리에 관한 특별법」제34조 및 같은 법 시행규칙 제16조

- 직경 500mm 이상의 지하시설물을 대상으로 매 5년마다 1회 이상의 공동(空洞)조사를 통한 안전 점검 시행

□ 추 진 실 적

◦ 지하시설물 안전관리 업무협정(MOU) 체결

▸도-시․군-관계기관 간의 업무협정 체결	: 2023. 3.

◦ 상수도 지하시설물 지반탐사 용역 추진

▸용역 발주 및 착수	: 2023. 3. ~ 4.

▸1차 탐사 및 중간결과 보고	: 2023. 4. ~ 6.

▸2차 천공 및 내시경 정밀 조사 및 복구작업	: 2023. 7.

▸지반탐사 보고서 작성 및 용역 완료	: 2023. 8.

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금마면 서고도리 산 33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 2024. 12.(4년간)

◦ 사 업 비 : 8,430백만원(균특 4,005백만원, 시비 1,717백만원, 원인자 2,708백만원)

▸당초 : 8,010백만원 → 변경 : 8,430백만원(증 420백만원)

※ 변경사유 :「익산시 수도정비 기본계획 변경(2019. 6.)」에 따른 원인자부담금            (㈜하림, 정족물류단지) 반영한 총사업비 변경 조정

▸2023년 사업비 : 1,429백만원(도비 1,000백만원, 시비 429백만원)

◦ 사업내용 : 금마배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

◦ 사업내역

구 분	사업비(단위:백만원)					공 종	공사내용
	합 계	도 급	관 급	폐기물	낙찰차액등
전체분	8,430	3,514	2,935	88	1,893
1 차 분	2,683	1,720	926	37	-	토목	토공, 배수지구체공, 옹벽공
2 차 분	502	122	380	-	-	토목	배수지구체공
잔여분	5,245	1,672	1,629	51	1,893	토목,건축,기계,전기	가압펌프 설치, 전기 및 계측제어, 배관공 등

※ 원가심사 절감액, 조달청 낙찰차액 등 잔여분 2024년 총사업비 정산 예정

□ 추 진 실 적

◦ 1차분 착공 및 준공	: 2022. 10. ~ 2023. 9.

▸기존 구조물 철거 및 1차분 폐기물 처리용역 준공

▸옹벽 및 배수지 콘크리트 구조물 설치

□ 마무리 대책

◦ 2차분 착공 및 준공                              : 2023.  9. ~ 12.

◦ 가압펌프 설치 등 잔여분 마무리 추진           : 2024.  1. ~ 12.

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 2023. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업(계획)량	사업비 (백만원)	비고
합 계			2,615
급수구역 확장공사	춘포면 갈전마을 외 3개소	배수관부설 L=3,970m	1,090
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	45개소, 9.5km	575	2차추경 △25백만원
급·배수관 개선공사	익산시 일원	475개소	950

□ 추 진 실 적

◦ 금강동 금곡마을 외 5개소 배수관부설공사(L=3.2km) 준공   : 2023. 9.

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사 38개소(L=8.7km) 준공    : 2023. 9.

◦ 급․배수관 개선공사 329개소 준공                    : 2023. 9.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

□ 마무리 대책

◦ 춘포면 갈전마을 배수관부설공사(1.6km) 추진           : 2023. 9. ~ 6.

◦ 급․배수관 개선공사 146개소 추진               : 2023. 7. ~ 12.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

5		상수도요금 현실화

□ 필 요 성

◦ 노후관 교체 등 노후시설 투자재원 확보

◦ 요금 현실화율 지속 하락, 결함액 증가로 재정건전성 제고 필요

◦ 상수도 요금 현실화율 현황

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
현실화율	75.1%	72.4%	71.4%	72.9%	69.6%

※ 2022년 ㎥당 요금 : 680.6원/㎥,  ㎥당 원가 : 977.7원/㎥

□ 추 진 실 적

◦ 상수도요금 인상 추진계획 수립               : 2023. 5.

▸ 2023년 11월 고지분부터 ~ 2028년까지 5차에 걸쳐 8.1%씩 인상

◦ 상수도 요금 인상에 따른 산업건설위원회 간담회  : 2023. 6.

◦ 지방물가대책위원회 심의(원안가결)            : 2023. 6.

◦「익산시 상수도 급수 조례」일부개정안 입법예고  : 2023. 7.

□ 마무리 대책

◦「익산시 상수도 급수 조례」공포                 : 2023.  9. 27.

◦ 대시민 홍보                                     : 2023. 10. ~ 12.

◦ 상수도 요금 인상 시행                        : 2023. 11. 고지분 부터

6		상수도요금 부과·징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.(매월 부과)

◦ 2023년도 요금 부과·징수 실적 및 과년도 체납액 징수실적

(‘23. 9. 22. 현재/8월 부과분 기준/단위:백만원, %)

구분	현년도 부과‧징수			과년도		비고
	목표액	부과액	징수액 (징수율)	체납 징수액 (징수율)	체납액
금액	27,984	18,236	18,020 (98.8%)	261 (34.3%)	500	과년도 체납액 : 761백만원

□ 추 진 실 적

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육 : 9회

▸계량기 조사원 담당구역 징수 책임제 시행 : 2회이상 체납자 독려, 단수예고문 부착

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수추진반 편성․운영 : 2개반 12명

▸전화, 문자, 방문 체납독려 : 12,860건

▸30만원, 3회이상 고액체납자 압류예고 및 압류시행 : 예고문 월평균 104건 발송/압류 28건

▸3만원, 2회이상 체납자 단수예고 및 단수시행 : 예고문 월평균1,327건 발송/단수137건

▸상수도사용료 체납자 독려 결과보고 : 17회

◦ 수도요금 고지 관리

▸월평균 60,135건 고지(우편발송 1,967건, 조사원전달 등 58,168건)

□ 마무리 대책

◦ 징수율 제고를 위한 체납징수 활동 강화로 체납액 이월 최소화

▸상습체납자 집중 징수기간 운영 및 행정조치 : 단수, 토지 및 건물 등 재산압류

※  기초생활수급자 등 사회적 약자 단수유예로 시민불편 최소화

7		깨끗한 수돗물 생산을 위한 정수시설 관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업대상 : 11개소(정수장 2, 배수지 7, 가압장 2)

◦ 사업내용

▸정수시설물(침전지, 배수지) 청소로 정수처리 효율 증가 및 맑은 물 공급

▸노후 시설물의 보수 및 교체공사로 안정적인 정수 생산

□ 추 진 실 적

◦ 배수지 청소 (1회), 침전지 청소 (3회) 실시	: 2023.  3. ~ 9.

◦ 정수시설물 풀깎기 용역(1, 2차) 실시	: 2023.  6. ~ 9.

◦ 정수시설물 유지보수 실시

공사명	완료일	공사명	완료일
신흥정수장 여과지 이중문 설치공사	2023. 3. 20.	신흥정수장 침전지 유입유량계 교체공사	2023. 3. 20.
신흥, 금강 정수장 침전지 슬러지 수집기 정비공사	2023. 3. 21.	금강정수장 노후 자동제어 설비 교체공사	2023. 3. 29.
정수시설 건물 옥상 방수공사	2023. 4. 27.	여과지 정수지 주변 정비공사	2023. 6. 5.
신흥정수장 착수정 버터플라이 밸브 수리	2023. 7. 31.	금마가압장 송수펌프 및 신흥 공업용수 상등수 수중펌프 보수공사	2023. 9. 19.

◦ 정수시설물 정기 안전점검 용역(상, 하반기) 실시	: 2023.  3. ~ 11.

◦ 정수시설물 정밀 안전점검 용역 실시	: 2023.  5. ~  9.

▸공업용수 처리시설(정수장, 배수지), 팔봉배수지, 금마가압장

◦ 신흥, 금강정수장 노후 철재시설 보수공사 실시	: 2023.  9. ~ 10.

□ 마무리 대책

◦ 정수시설물 청소 및 풀깎기 용역	: 2023. 10. ~ 11.

◦ 금강정수장 기존염소설비 철거공사	: 2023. 10. ~ 11.

◦ 정수장 노후펌프 보수공사	: 2023. 10. ~ 12.

8		신흥정수장 차염설비 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 신흥정수장 차염설비 설치공사

◦ 위    치 : 신흥정수장 내

◦ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 1.

◦ 사 업 비 : 657,000천원

◦ 사업개요 : 정수장 차염(차아염소산나트륨) 설비(40㎥) 설치

□ 추진실적

◦ 차염설비 설치공사 실시설계용역 착공                 : 2023.  3. 6.

◦ 차염설비 설치공사 실시설계용역 준공                 : 2023.  5. 4.

◦ 2회추경 예산확보(5.5억원 ⇒ 6.57억원)                 : 2023.  7.

◦ 차염설비 설치공사 계약심사 및 발주 의뢰             : 2023.  9.

□ 마무리 대책

◦ 차염설비 설치공사 계약 및 착공                      : 2023. 10.

◦ 차염설비 설치공사 준공                              : 2024.  1.

9		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 확보를 위한 주민 홍보 강화

□ 추진실적

◦ 원․정수 목표 수질 달성 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화 실시

구 분	원 수	정 수
수질검사 실 적	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 월 간 : 수소이온농도 등 11개 분 기 : 질산성질소 등 42개 반 기 : 바이러스 등 3개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시 : 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부(50,000부)	: 2023.  4.

◦ 수질검사결과 홍보강화 : 공공기관, 홈페이지(매월) 및 내고장소식지 등 게재

◦ 상반기 수돗물 평가위원회 개최	: 2023.  4. 20.

▸ 정수시설 운영 및 지방상수도 현대화사업 등 질의응답

◦ 신흥·금강정수장 노후 수질자동측정기 교체 실시	: 2대

□ 마무리 대책

◦ 상수원 수로 순찰 등 원‧정수의 철저한 수질관리로 시민이 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급

◦ 하반기 수돗물 평가위원회 개최	: 2023. 11.