하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 주요성과
□	2023 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	체계적 시설 개선 및 악취관리로 시민친화형 하수처리시설 운영 사람과 안전중심의 지속가능한 공공하수도 정비 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	경쟁력 있는 시민 맞춤형 하수관로 정비사업 추진 친환경 하수처리장 운영을 통한 방류수질 개선 침수 우려지역 선제적 정비로 공공하수도 침수피해 예방

일  반  현  황

□ 기         구

											하 수 도 과
하수행정				하수시설						하수운영					생활하수				하수관리						지하수

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	6	6	6	5
현 원	24	1	8	7	1	7
증 감			2	1	△5	2

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 북부1처리분구 하수관로 정비사업, 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업, 분류식관거 배수설비 설치공사
◦	하수운영 :	공공하수처리시설 운영 및 유지관리, 소규모공공하수처리시설, 제3·국가식품 산업단지 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 운영․관리, CSOs 운영 및 유지관리, 산업단지 폐수 유입승인, 비용부담금 부과징수
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	노후하수관로 정비사업, 시내일원하수도공사, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과, 온천지구 관리

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2022.12.	비 고
시설	총인구	천명	273
	하수인구	천명	261
	보급률	%	95.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	114,028
	1일평균하수처리량	톤	111,363
	하수처리율	%	97.66
하수도 사용	개소수	전	40,551
	톤당 평균요금	원	877.97

□ 하수(폐수)처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	준공일자	비 고
계	30	150,110㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	1995.07	민간위탁 [(주) 전북엔비텍]
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	2004.09	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	2008.06	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	2008.06	〃
분뇨처리장	1	150㎥/일	2009.12	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	2010.05	민간위탁 [환경시설관리(주)]
소규모 공공하수처리시설	22	1,760㎥/일	1995~2017	〃
제3일반산업단지 공동 폐수처리시설	1	5,500㎥/일	2014.07	〃
국가식품클러스터 폐수처리시설	1	5,000㎥/일	2019.12	〃

2023 예산집행실적

【 2023. 9. 22. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
하수도과				85,191,508	50,340,550	34,850,958	59.1
	하수도공기업관리(사업)			34,817,688	32,953,545	1,864,143	94.6
		하수도사업관리(사업)		34,817,688	32,953,545	1,864,143	94.6
			하수관거 유지관리	111,841	33,276	78,565	29.8
			지하수관리	32,420	6,430	25,990	19.8
			하수관거 BTL사업운영비	14,006,200	13,321,991	684,209	95.1
			하·폐수처리시설 운영	20,667,227	19,591,848	1,075,379	94.8
	행정운영경비			3,811,556	2,618,975	1,192,581	68.7
		인력운영비		3,115,565	2,167,487	948,078	69.6
			인력운영비	3,115,565	2,167,487	948,078	69.6
		기본경비		695,991	451,488	244,503	64.9
			기본경비	695,991	451,488	244,503	64.9
	예비비			100,000	0	100,000	0
		예비비		100,000	0	100,000	0
			예비비	100,000	0	100,000	0
	하수도공기업관리(자본)			46,125,264	14,588,741	31,536,523	31.6
		하수도사업(자본)		46,125,264	14,588,741	31,536,523	31.6
			남부2/1, 2/2 배수분구 하수관로정비	12,113,159	3,299,091	8,814,068	27.2	계속비이월 3,847,653천원
			북부1처리분구하수관로 정비	5,014,378	3,596,725	1,417,653	71.7	계속비이월 2,289,083천원
			함열읍 와리 우수박스 설치	645,000	45,500	599,500	7.1	건설개량이월 45,000천원
			관내 분류식 배수설비 설치	1,011,954	547,719	464,235	54.1	건설개량이월411,954천원
			흥왕 소규모 하수처리시설	664,602	0	664,602	0.0	계속비이월 190,602천원
			장점 소규모 하수처리시설	400,000	0	400,000	0.0
			상갈 소규모하수처리시설	400,000	0	400,000	0.0
			익산시 금마 하수처리시설 증설	724,590	0	724,590	0.0	계속비이월 459,590천원
			익산시 환경기초시설 악취개선	1,800,900	93,210	1,707,690	5.2	계속비이월 446,959천원
			익산 공공하수 차집관로 정비	834,000	0	834,000	0.0
			하·폐수처리시설 유지관리	2,020,327	331,343	1,688,984	16.4
			용안(구)분뇨처리장 철거	15,000	10,098	4,902	67.3
			지하수보전	55,000	53,198	1,802	96.7
			노후하수관로 정비-2단계	3,140,000	1,564,109	1,575,891	49.8	계속비이월 1,145,000천원 사고이월 1,000,000천원
			노후하수관로 정비-영등지구	1,305,343	170,200	1,135,143	13.0	계속비이월 227,343천원
			노후하수관로 정비 - 국가산업단지	2,978,290	767,378	2,210,912	25.8	계속비이월 1,193,290천원
			노후하수관로 정비-정밀조사	794,000	331,614	462,386	41.8	건설개량이월 397,000천원
			하수도 민원처리	2,681,356	1,520,417	1,160,939	56.7	건설개량이월597,851천원
			금강동 2산단 하수관로 관리	30,000	0	30,000	0.0	2회 추경예산 편성
			황등면 침수구역 하수관로 정비사업	600,000	0	600,000	0.0	2회 추경예산 편성
			물 재이용 관리	9,000	9,000	0	100.0	2회 추경예산 편성
			장선처리분구 하수관로 정비사업	667,000	0	667,000	0.0	2회 추경예산 편성
			송학동 침수 개선사업	100,000	0	100,000	0.0	2회 추경예산 편성
			익산공공하수탄소중립 프로그램 태양광 설치	1,709,000	738,456	970,544	43.2	건설개량이월 1,709,000천원
			익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업	723,582	435,482	288,100	60.2	계속비이월 723,582천원
			지하시설물지반탐사	203,000	57,906	145,094	28.5	건설개량이월 73,000천원
			화평마을 오수관로 설치공사	434,251	348,781	85,470	80.3	건설개량이월 434,251천원
			금마면 용순길 226주변 하수관로 정비공사	86,746	40,000	46,746	46.1	사고이월 86,746천원
			남부2/3,북부3처리분구 하수관거 정비사업	3,817,028	104,827	3,712,201	2.7	건설개량이월 3,817,028천원
			송학동 880번지 일원 하수관로 정비공사	7,380	1,532	5,848	20.8	건설개량이월 7,380천원
			송학동 배수설비 설치공사	214,139	213,016	1,123	99.5	건설개량이월 214,139천원
			송학동 우수박스정비사업	868,390	251,290	617,100	28.9	사고이월 868,390천원
			익산시 노후하수관로 정밀조사용역(2단계)	57,849	57,849	0	100.0	사고이월 57,849천원
	재무활동			187,000	179,289	7,711	95.9
		보전지출		187,000	179,289	7,711	95.9
			국도비집행잔액 반납	187,000	179,289	7,711	95.9
	예비비(자본)			150,000	0	150,000	0.0
		예비비(자본)		150,000	0	150,000	0.0
			예비비(자본)	150,000	0	150,000	0.0

2023 주요성과

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율 개선

‣남부2-1, 2-2배수분구 하수관로 정비사업 추진(공정률 35.4%)

- 관로정비 3.2km, 배수설비 957개소

‣북부1처리분구 하수관로 정비사업 추진(공정률 3%)

- 오수관로 신설 L=474m

‣황등면 황방1마을 분류식 배수설비 설치공사 준공

- 오수신설 0.57km, 배수설비 33개소, 맨홀펌프장 1개소

‣송학동 배수설비 설치공사 준공

- 오수관로(D200mm) L=0.292km, 배수설비 31가구

‣화평마을 배수설비 설치공사 준공

- 오수관로 L=0.32km, 배수설비 7가구

‣하수시설 민원처리 배수설비 설치공사 21건 처리 완료

◦ 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 완료

‣기존 소화조 개량(10,000㎥/일) 및 소화조 증설(6,692㎥/일)

‣협작물처리기, 농축시설 및 저류조 운영방식 개선 및 반류수처리시설 설치

◦ 공공하폐수처리장 효율적 운영을 통한 수질환경개선 및 악취방지대책 추진

‣환경기초시설 악취개선사업 실시설계용역 시행을 통한 악취 저감 추진

‣금마하수 총인 제어 PC 교체 등 노후 설비 교체 추진으로 방류수질 관리철저

◦ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣소규모 공사 126건 및 생활민원 168건 처리

‣생활민원 처리를 위한 비상근무조(4개조,12명) 운영 : 2,160건

(파손 하수관로 복구, 맨홀 단차조정 및 하수도 준설 등)

□ 반      성

◦ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 공정률 부진

‣ 행정절차 추진 및 설계변경으로 착공 및 공사 지연

		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 북부1 처리분구 하수관로 정비사업 함열읍 와리 우수박스 설치공사 장점 소규모하수처리시설 신설 상갈 소규모하수처리시설 신설 장선처리분구 하수관로 정비사업 송학동 우수박스 정비사업 환경기초시설 악취개선 사업 공공하수처리시설 운영관리(BTO) 공공하⦁폐수처리시설 관리대행 익산 공공하수 차집관로 정비사업 익산시 노후하수관로 정비사업(2단계) 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 영등지구 노후하수관로 정비사업 소규모 하수도시설 정비공사

2023 주요업무결산

1		남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 마동, 갈산동, 주현동, 중앙동, 인화동, 평화동 일원

◦ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 오수관로 신설 3.5km, 굴착교체 8.5km, 비굴착 전체보수 0.9km, 부분보수 5,195개소, 배수설비 1,694가구, 맨홀펌프장 9개소, 자가펌프장 11개소

◦ 총사업비 : 37,386백만원(국비  13,559 도비 2,382 시비  21,445)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020이전	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	37,386	1,321	2,604	6,374	8,266	18,821
국비( 36%)	13,559	642	1,366	4,655	1,961	4,935
도비( 6%)	2,382	64	136	465	345	1,372
시비( 58%)	21,445	615	1,102	1,254	5,960	12,514

□ 추 진 실 적

◦ 공정률 : 35.4% (관로 3.2㎞, 배수설비 957개소)

◦ 2차분 공사 추진	: 2022. 7. ~ 2023. 11.

▸신설오수관로 L=552m, 굴착교체 L=835m, 배수설비 설치 263개소

◦ 3차분 공사 추진	: 2023. 3. ~ 2024. 11.

▸신설오수관로 L=509m, 굴착교체 L=976m, 배수설비 설치 333개소

□ 마무리 대책

◦ 2차분 공사 준공	: 2023. 11.

◦ 3차분 공사 추진	: 2023.  3. ~ 2024. 11.

2		북부1처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동, 부송동, 팔봉동, 정족동, 임상동, 월성동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 2. ~ 2026. 3.

◦ 사업내용 : 오수관로 L=28.4km, 배수설비 1,363가구

◦ 총사업비 : 44,242백만원(국비 24,851 도비 1,939 시비 17,452)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2020	2021	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	44,242	714	1,153	2,019	2,725	37,631
국비( 56%)	24,851	500	1,010	1,411	2,503	19,427
도비( 4%)	1,939	21	43	60	107	1,708
시비( 40%)	17,452	193	100	548	115	16,496

□ 추 진 실 적

◦ 공정률 : 3% (관로 534m, 전체보수 1.521m, 부분보수 437개소)

◦ 1차분 공사 추진

▸신설오수관로 L=474m

□ 마무리 대책

◦ 1차분 공사 준공	: 2023. 12.

3		함열읍 와리 우수박스 설치공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열읍 와리 324-8번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 우수박스 신설 2.0×1.2 L=330m, 1.5×1.2 L=66m

◦ 총사업비 : 930백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 추진	: 2023. 2. ~ 9.

◦ 설계안정성검토 용역 추진	: 2023. 6. ~ 9.

◦ 설계심의 의결	: 2023. 8. 7.

◦ 계약심사 완료	: 2023. 9. 8.

□ 마무리 대책

◦ 공사 발주	: 2023. 10.

◦ 공사 추진	: 2023. 11. ~ 2024. 7.

4		장점 소규모하수처리시설 신설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함라면 신등리 일원(장점, 왈인, 장고재, 장등, 진산, 망월, 회룡마을)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 신설 65㎥/일

◦ 총사업비 : 7,538백만원(국비  4,523 도비 1,507 시비  1,508)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	7,538	400	2,915	4,223
국비( 60%)	4,523	300	1,689	2,534
도비( 20%)	1,507	100	563	844
시비( 20%)	1,508	0	663	845

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 전라북도 원가심사              : 2023.  6. 27.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                           : 2023. 10.

□ 마무리 대책

◦ 사업수행능력 평가 실시	: 2023. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진                           : 2023. 12. ~

5		상갈 소규모하수처리시설 신설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 삼기면 서두리 일원(상갈, 하갈, 신평, 화초, 원서두마을)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 마을하수처리장 신설 60㎥/일

◦ 총사업비 : 5,018백만원(국비  3,011 도비 1,003 시비  1,004)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	5,018	400	1,906	2,712
국비( 60%)	3,011	300	1,084	1,627
도비( 20%)	1,003	100	361	542
시비( 20%)	1,004	0	461	543

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 전라북도 원가심사              : 2023. 6. 27.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                           : 2023. 10.

□ 마무리 대책

◦ 사업수행능력 평가 실시	: 2023. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진                           : 2023. 12. ~

6		장선처리분구 하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열읍, 황등면, 함라면, 성당면 일원

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

◦ 사업내용 : 오수관로 L=26.8km, 배수설비 918가구

◦ 총사업비 : 24,433백만원(국비 14,660 도비 4,886 시비 4,887)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	2026	비고
합계(100%)	24,433	667	4,886	7,552	11,328
국비( 60%)	14,660	500	2,832	4,531	6,797
도비( 20%)	4,886	167	944	1,510	2,265
시비( 20%)	4,887	0	1,110	1,511	2,266

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 전라북도 원가심사             : 2023.  6. 27.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                          : 2023. 10.

□ 마무리 대책

◦ 사업수행능력 평가 실시                             : 2023. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진                          : 2024.  1. ~

7		송학동 우수박스 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 송학동 97-7번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 우수박스 설치 2.0m×1.5m, L=380m

※ 기존 시설물 현황 : 1.5m×1.0m ~ 1.5m×1.2m

◦ 총사업비 : 1,000백만원(특교세 1,000)

□ 추 진 실 적

◦ 공사 착공                                        : 2022. 12. 30.

◦ 공사 중지                                        : 2023.  1. 16.

◦ 공사 중지 해제                                   : 2023.  4. 18.

◦ 기술지도용역 시행                                : 2023.  6. 15.

◦ 폐기물 처리용역 시행                             : 2023.  6. 20.

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공                                       : 2023. 12.

8		환경기초시설 악취개선사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 총 8개소(익산·분뇨·북부·함열·금마·여산하수,1·2중계펌프장)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 악취방지시설 신규 설치 및 용량 재구성 등

◦ 총사업비 : 7,995백만원(국비 4,320 도비 1,838 시비 1,837)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	7,995	667	1,354	5,974
국비( 54%)	4,320	500	755	3,065
도비( 23%)	1,838	167	326	1,345
시비( 23%)	1,837	0	273	1,564

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역 착수	: 2022. 6.

◦ 실시설계 용역 중지	: 2022. 11.

◦ 총사업비 변경 및 재원협의(전북지방환경청)          : 2023.  2.

◦ 전북지방환경청 재원협의 보완 요청                 : 2023.  5.

▸1・2중계펌프장 악취기술진단 결과보고서 제출

◦ 1・2중계펌프장 악취기술진단 실시 및 재원협의 보완   : 2023.  6. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 실시설계 용역 준공	: 2023. 10.

▸ 총사업비 변경 재원 협의 결과 반영

◦ 행정절차 이행(설계심의, 원가심사 등)              : 2023. 10. ~ 11.

◦ 공사 착수                                        : 2023. 12.

9		공공하수처리시설 운영관리(BTO)

□ 시 설 현 황

◦ 공공하수처리시설(BTO) : 5개소, 중계펌프장 17개소

하수처리시설명	익산	북부	함열	금마	분뇨	중계펌프장
시설용량 (㎥/일)	100,000	30,000	6,000	1,100	150	17개소
운영방식	위탁운영 [(주)전북엔비텍 BTO, 2008. ~ 2028.]

◦ 2023년 BTO위탁운영비 : 16,590백만원(도비 590 시비 16,000)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하수처리시설 최적 운영으로 법정 수질 준수(6개 항목)

▸방류수수질기준 1회/일 검사(BOD, TOC, SS, T-N, T-P, 총대장균수)

◦ 공공하수처리시설 분기별 복합악취농도 검사 기준 준수(부지경계, 탈취기 배출구)

▸익산공공하수 등 4개 처리시설 1, 2, 3분기 완료

◦ 공공하수처리시설(BTO) 안전점검 실시	: 2023. 1. ~ 6.

▸익산 외 3개 공공하수처리시설 해빙기, 안전대전환 안전점검 완료

◦ 공공하수처리시설(BTO) 노후 설비 교체 추진                : 2023. 5.

▸익산하수 1,2,3중계펌프장 비상발전기, 금마하수 원심탈수기, 함열하수 감시제어설비

◦ 공공하수처리시설(BTO) 대수선 시행 및 완료                : 2023. 7. ~ 9.

▸금마하수,익산하수 펌프장 수중펌프 보수, 익산하수 3펌프장 탈취설비 세정수 순환펌프 보수, 금마하수 총인 제어 PC 교체

□ 마무리 대책

◦ 공공하수처리시설 복합악취농도 검사 4분기 실시	: 2023. 11.

◦ 동절기 공공하수처리시설(BTO) 안전점검 실시	: 2023. 11. ~ 12.

▸익산공공하수 등 4개 처리시설 동절기 대비 점검 실시

10		공공하·폐수처리시설 관리대행

□ 시 설 현 황

◦ 공공하·폐수처리시설 : 25개소

▸여산 1, 소규모 22, 제3산업단지 1, 국가식품클러스터 1

하·폐수 처리시설명	하수처리장			폐수처리장
	여산	소규모 22개소	중계 펌프장	제3산업단지	국가식품클러스터	폐수중계 펌프장
시설용량 (㎥/일)	600	1,760	105개소	5,500	5,000	4개소
운영방식	위탁운영[환경시설관리(주), (유)일토씨엔엠 2023. 1. ~ 2025. 8.]

◦ 2023년 공공하·폐수처리시설 위탁운영비 : 3,517백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 공공하·폐수처리시설 수질 및 운영관리

◦ 여산 공공하수처리시설 반송 슬러지 펌프 수리	: 2023.  3.

◦ 제3산단 탈수기 제어용 PLC교체	: 2023.  4.

◦ 국가식품클러스터 세목스크린 보수 실시	: 2023.  4. ~ 6.

◦ 3산단 폐수처리장 실험실 TOC분석기기 교체         : 2023.  6.

◦ 동산유천 공공하수처리시설 외 2개소 기술진단 완료      : 2023.  7.

◦ 공공폐수처리시설 운영‧관리 실태평가(환경부)	: 2023.  8.

◦ 3산단 시설개선공사 외 15개 보수공사 실시          : 2023.  1. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 동절기 대비 하·폐수처리시설 안전점검 실시         : 2023. 11.

◦ 3산단 기술진단 개선사항 외 4개 보수공사 완료      : 2023. 12.

11		익산 공공하수 차집관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 시내 일원

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

◦ 사업내용 : 익산공공하수시설 차집관로 23km 등

◦ 총사업비 : 42,348백만원(국비 25,408 도비 8,470 시비 8,470)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2023	2024	2025	비고
합계(100%)	42,348	834	1,868	39,646
국비( 60%)	25,408	500	1,121	23,787
도비( 20%)	8,470	167	373.5	7,929.5
시비( 20%)	8,470	167	373.5	7,929.5

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계용역 원가심사 의뢰(市→道)	: 2023.  6.

◦ 익산시 계약심의위원회 심의 완료	: 2023.  6.

◦ 기본 및 실시설계용역 원가심사 결과 회신	: 2023.  7.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행 공고	: 2023. 10.

□ 마무리 대책

◦ 기본 및 실시설계용역 사업수행능력 평가 실시        : 2023. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2023. 12. ~

12		익산시 노후하수관로 정비사업(2단계)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동, 송학동, 모현동 일원

◦ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2025. 12.

◦ 사업내용 : 노후우수박스 정비 L=2.63km

※ 평화동(1,250m), 송학동(910m), 모현동(470m)

◦ 총사업비 : 17,350백만원(국비 8,355 도비 835 시비 8,160)

※ 2023년 사업비: 995백만원(국비 902 도비 90 시비 3)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022년	2023	2024	비고
합계(100%)	17,350	1,220	1,145	995	13,990
국비( 50%)	8,355	500	1,041	902	5,912
도비( 5%)	835	50	104	90	591
시비( 45%)	8,160	670		3	7,487

□ 추 진 실 적

◦ 익산시 노후하수관로 정밀조사용역 실시	: 2016.  3.

◦ 2021년 국고보조사업 확정	: 2020.  9.

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 10.

◦ 설계경제성(VE) 검토 용역 시행	: 2020. 11.

◦ 특허, 신기술 공법 선정	: 2022. 12.

◦ 기술자문위원회, 재원협의 등 행정절차 추진 완료  : 2023.  8.

□ 마무리 대책

◦ 공사 착수 및 완료	: 2023. 11. ~ 2025. 12.

13		국가산업단지 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 제1국가산업단지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2024. 12.

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=13.4km

◦ 총사업비 : 13,555백만원(국비 6,394 도비 640 시비 6,521)

※ 2023년 사업비: 1,786백만원(국비 742 도비 74 시비 970)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021 이전	2022	2023	2024	비고
합계(100%)	13,555	1,190	1,215	1,786	9,364
국비( 50%)	6,394	500	851	742	4,301
도비( 5%)	640	50	85	74	431
시비( 45%)	6,521	640	279	970	4,632

□ 추 진 실 적

◦ 환경부(전북지방환경청) 재원협의 보완	: 2022. 5.

◦ 환경관리공단 기술검토 의뢰	: 2022. 6.

◦ 환경관리공단 기술검토 의견회신	: 2022. 6.

◦ 환경부(전북지방환경청) 재원협의 완료	: 2022. 7.

◦ 공사 착공 및 건설사업관리용역 업체 선정	: 2022. 12. ~ 2023. 4.

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2024. 12.

14		영등지구 노후하수관로 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동(5,854m), 마동(1,060m), 남중동(286m) 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 노후하수관로정비 L=7.2km

◦ 총사업비 : 6,306백만원(국비 3,153 도비 315 시비 2,838)

※ 2023년 사업비: 1,078백만원(국비 1,034 도비 44)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2022이전	2023	2024	비고
합계(100%)	6,306	550	1,078	4,678
국비( 50%)	3,153	500	1,034	1,619
도비( 5%)	315	50	44	221
시비( 45%)	2,838	0	0	2,838

□ 추 진 실 적

◦ 2022년 환경부 신규 국고보조사업 확정	: 2021. 10.

◦ 실시설계용역 조달 발주 의뢰	: 2022.  4.

◦ 실시설계용역 착수	: 2022.  5.

◦ 재원협의 등 행정절차 추진	: 2023.  9.

□ 마무리 대책

◦ 실시설계용역 준공	: 2023. 10.

◦ 공사 발주 및 착공	: 2023. 12.

15		소규모 하수도 시설 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 1,863백만원 (시비)

◦ 사업내용

▸소규모 하수도시설 정비공사                 : 28건 / 900백만원

▸생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)	: 25건 / 263백만원

- 함열읍 하시하마을 하수도 정비공사 외 24건

▸하수관로 기계준설	: 18건 / 700백만원

□ 추 진 실 적

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸하수도 공사 발주 22건(617백만원)	: 2023. 1. ~  9.

※민원처리 93건 포함

◦ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성)

▸공사 21건 완료(216백만원)	: 2023. 1. ~  9.

◦ 하수관로 기계준설

▸하수도 공사 발주 12건(453백만원)	: 2023. 1. ~  9.

□ 마무리 대책

◦ 소규모 하수도시설 정비공사

▸4분기 공사 발주 6건(330백만원)	: 2023. 10. ~ 12.

◦ 하수관로 기계준설

▸4분기 공사 발주 6건(247백만원)	: 2023. 10. ~ 12.