녹색도시조성과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 예산집행실적
□	2023 주요성과
□	2023 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 사람이 공존하는 푸른 익산 조성

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	점·선·면 연결 익산 그린인프라 구축 민·관협력 정원문화산업 기반 구축 쾌적한 공원· 녹지환경 조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	푸른 숲과 꽃이 어우러진 아름다운 도시미관 조성 시민참여 생활밀착형 도시정원 조성 시민이 공감하는 도시공원 확충

일   반   현   황

□ 기        구

				녹색도시조성과
푸른숲조성			정원문화산업					가로수환경			공원조성

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	17	1	1	4	3	2	6	공무직2, 기간제2
현 원	17	1	1	5	3	1	6
증 감				1		△1

□ 사 무 분 장

◦ 푸른숲조성	:	도시숲 및 학교숲 조성, 기후대응 도시숲 조성사업, 녹색자금 지원사업, 산림서비스 도우미 지원, 녹색일자리 확충, 나무 나누어주기 사업 추진, 푸른익산 가꾸기 사업
◦ 정원문화산업	:	초화류 생산 및 식재, 꽃바람정원 유지관리, 꽃양묘장 유지관리, 스마트가든 설치, 생활밀착형 숲 조성, 어울림정원 조성, 용안생태습지 지방정원 추진, 민간정원 및 수목원 유지관리
◦ 가로수환경	:	가로수(중앙분리대) 및 가로화단 조성ㆍ관리, 병해충 방제 (가로수,가로화단, 중앙분리대), 자녀안심그린숲, 생활권 수목진료 민간 컨설팅
◦ 공원조성	:	공원·녹지조성계획 수립 및 시행, 공원조성 및 재정비사업, 공원리모델링 사업, 장기미집행 도시공원 조성, 공원 조성에 따른 보상 및 등기 업무,공원사업 시행 인·허가 및 실시계획인가, 공원녹지 일시사용 승인 및 점용허가

□ 공원 지정 현황

(2023.9.22.현재)

구 분	개 소	면적(ha)	조성(ha)	조성률(%)	비고(미조성공원)
계	115	513.1	455.7	89.0
근린공원	47	454.8	399.3	87.7	- 장기미집행 도시공원 7개소, 인화공원
어린이공원	42	9.8	9.8	100.0
소공원	17	5.9	5.9	100.0
주제공원	9	42.6	40.7	95.5	- 제2호수변공원

□ 녹지 현황

(2023.9.22.현재)

구 분	개 소	면적(ha)	조성(ha)	조성률(%)	비고(미조성녹지)
계	119	65.7	64.9	98.8
완충녹지	92	58.4	57.6	98.6	- 완충녹지(황등면) 2개소
경관녹지	19	6.1	6.1	100.0
연결녹지	8	1.2	1.2	100.0

□ 가로수 현황	(2023.9.22.현재)

구 분	구 간	노선길이(㎞)	본 수(본)	비율(%)	비 고
계	138	356	52,655	100
시내구간	112	249	32,716	62
시외구간	26	107	19,939	38

※ 왕벚(27%), 이팝(17%), 은행(14%), 배롱(10%), 메타(8%), 기타(24%)

□ 도시숲 현황	(2023.9.22.현재)

구 분	개 소	면 적(ha)	비 고
계	96	22.8
도시숲	66	20.1
교통섬	30	2.7

□ 위원회 현황	(2023.9.22.현재)

구 분	구 성	근 거	비고
도시숲등의 조성·관리 심의위원회	10명 (당연1, 위촉9)	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 익산시 도시숲 등의 조성 및 관리 조례
도시공원위원회	11명 (당연2, 위촉9)	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 익산시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례

2023 예산집행실적

【 2023. 9. 22. 현재 】                              (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
녹색도시조성과				22,664,328	12,867,595	9,796,733	56.8%
	녹색환경도시조성			22,620,679	12,824,688	9,795,991	56.6%
		도시림등 조성		14,399,485	9,011,919	5,387,566	62.5%
			도시숲 유지관리	1,857,853	1,363,452	494,401	73.3%
			기후대응 도시숲 조성사업	3,800,000	1,935,957	1,864,043	50.9%	송학동(4월),오산면(6월)착공
			푸른익산가꾸기 사업	125,000	125,000	0	100%
			도시숲 조성사업(도시숲조성)	1,200,000	401,839	798,161	33.4%	착공(6월)
			도시숲 조상사업(학교숲 조성)	400,000	340,793	59,207	85.1%
			녹색일자리 확충	37,044	34,335	2,709	92.6%
			녹색자금 지원사업 (무장애나눔길 조성)	1,000,000	503,472	496,528	50.3%	착공(8월)
			녹색자금지원사업 (복지시설 나눔숲(실외)조성)	197,000	79,200	117,800	40.2%	착공(6월)
			산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리원)	24,525	16,546	7,979	67.4%	2회추경 포함
			꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기	707,007	521,976	185,031	73.8%
			수목양묘장 조성 및 관리	32,305	25,968	6,337	80.3%
			꽃양묘장 관리 및 꽃조성	690,890	443,414	247,476	64.1%	인건비 지급시기 미도래, 2회추경 포함
			스마트가든볼	240,000	224,720	15,280	93.6%
			생활밀착형숲 조성	500,000	448,685	51,315	89.7%
			산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	22,906	16,916	5,990	73.8%

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			정원조성 및 유지관리	1,158,142	707,611	450,531	61.0%	준공시기 미도래 (이월,2회추경 포함)
			민간정원 보완사업	40,000	40,000	0	100%
			수목원 유지관리	35,000	35,000	0	100%
			가로화단 조성 및 관리	526,037	408,882	117,155	77.7%
			중앙분리대 수목관리	158,208	116,917	41,291	73.9%
			가로수 유지관리	628,892	466,520	162,372	74.1%
			도시숲조성사업 (가로수조성)	600,000	483,062	116,938	80.5%
			도로변 병해충	213,676	169,988	43,688	79.5%
			생활권 수목진료 지원	5,000	0	5,000	0.0%	준공시기 (10월말) 미도래
			자녀안심그린숲	200,000	101,666	98,334	50.8%	가을철 사업추진
		공원계획 및 조성		4,798,163	2,366,700	2,431,463	49.3%
			공원리모델링사업	500,000	0	500,000	0.0%	2회 추경 (설계용역 진행중)
			황등공원 조성사업	612,785	351,032	261,753	57.2%	행정절차 이행중
			전라선 폐선부지 공원조성사업	2,134,600	1,064,962	1,069,638	49.8%	2회추경 포함
			공원조성계획결정	411,674	161,602	250,072	39.2%	2회추경 포함
			배산공원조성사업	789,104	789,104	0	100%
			녹지조성사업	150,000	0	150,000	0.0%	2회추경 (협의 진행중)
			도시공원 및 녹지 정비사업	200,000	0	200,000	0.0%	2회추경 (설계 진행중)
		장기미집행 도시공원 조성		3,423,031	1,446,069	1,976,962	42.2%
			공원조성계획	3,423,031	1,446,069	1,976,962	42.2%	토지 소유자 미협의
	행정운영경비			43,649	42,907	742	98.3%
		기본경비		43,649	42,907	742	98.3%
			기본경비	43,649	42,907	742	98.3%

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 500만 그루 나무심기 사업 원활한 추진

‣ 수목 식재 1,181,178그루 (공공부문 1,060,118, 민간부문 121,060)

‣ 1시민 1정원 나무 나누어주기 사업 추진 30,000주(시민 5,000가구)

‣ 【민간부문】민간정원 및 기부수목 식재 등

◦ 국가예산 확보

‣ 2024년 오산면, 인화동, 모현공원 기후대응 도시숲 국비 37.5억원 확보

◦ 도시숲, 기후대응 도시숲 조성 및 관리로 쾌적한 녹색도시 미관개선

‣ 남중동 황등면 유휴부지 등 5개소(소나무, 이팝나무 등 8,437주)

‣ 송학동 ․ 오산면 기후대응 도시숲 등 2개소 실시설계 및 사업 착공

‣ 이리팔봉초 학교숲 등 4개소(서부해당화, 블루엔젤 등 18,038주)

◦ 가로수 및 자녀안심 그린숲 조성으로 녹색네트워크 구축 추진

‣ 목천동 대간선수로 가로수 0.7km(느티나무 등 17종 10,419주 식재)

‣ 이리부천초, 이리송학초 자녀안심그린숲 0.5km(왕벚나무 등 6종 722주 식재)

◦ 아름다운 도시경관 조성사업 추진

‣ 자연친화적 감성 꽃거리 조성 : 39개소 초화/관목 식재

‣ 꽃향기 가득한 익산 만들기를 위한 계절꽃 단지(정원) 조성 :132개 기관, 초화류 220천본 지원

‣ 꽃바람정원 조성 및 유지관리(정원 만들기 행사 1회, 계절꽃밭 2,000㎡)

‣ 스마트가든 조성 : 8개소(한국식품산업클러스터진흥원 본관 외  7개소)

◦ 도시공원 조성사업 추진

‣ 배산공원 정비사업 : 야간보행을 위한 내부 둘레길 공원등 정비(2km), 연주정 암벽구간 데크 설치 및 화장실 옆 계단 정비, 맞이공간 화단 조성 등

‣ 인화공원 조성사업 : 공공시설(화장실) 설치사업(2개소) 및 운동기구 설치, 솜리메타누리길 조성사업(2차)

□ 반      성

◦ 예측불가능한 기후변화(태풍,폭염 등)로 공사지연 및 수목유지관리 어려움

‣ 적정 공사기간 부여 및 관수, 배수 등 적극적인 수목관리로 하자 최소화

◦ 시기별 민원 동시다발적 발생으로 신속처리 미흡

‣ 전지, 제초, 병해충 방제 등 사전 조치를 통한 민원 발생 최소화

2023 주요업무결산

		기후대응 도시숲 조성사업
		녹색자금 지원사업(무장애나눔길)
		500만 그루 나무심기 사업
		꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기
		생활밀착형 숲 및 스마트가든 조성사업
		어울림정원 만들기 및 민간정원 보완사업
		가로수 조성 및 유지관리
		배산공원 정비사업
		인화공원 조성사업
		장기미집행 공원 토지매입

1		기후대응 도시숲 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 송학동 880-4번지 ~ 오산면 오산리 1071번지 일원

(폐철도 유휴부지, 폭 20m × 길이 3.5km, 7ha)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사 업 비 : 70억원(기금 35억원, 시비 35억원)

▸2022년–2억원, 2023년–38억원, 2024년–30억원

◦ 사업내용 : 미세먼지 저감 수목 식재, 산책로 및 쉼터 조성 등

< 송학동 기후대응 도시숲 조성 >

◦ 위    치 : 송학동 880-4번지 일원(3ha)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.(2022년 실시설계, 2023년 사업)

◦ 사 업 비 : 30억원(기금 15억원, 시비 15억원)

▸2022년–2억원(기금 1, 시비 1), 2023년–28억원(기금 14, 시비 14)

< 오산면 기후대응 도시숲 조성 >

◦ 위    치 : 오산면 오산리 1071번지 일원(4ha)

◦ 사업기간 : 2023. 1.~2024. 12.(2023년 실시설계+사업, 2024년 사업)

◦ 사 업 비 : 40억원(기금 20억원, 시비 20억원)

▸2023년–10억원(기금 5, 시비 5), 2024년–30억원(기금 15, 시비 15)

□ 추 진 실 적

< 송학동 기후대응 도시숲 >

◦ 송학동 기후대응 도시숲 설계심의위원회	: 2023. 2. 8.

◦ 송학동 기후대응 도시숲 원가심사, 일상감사	: 2023. 3. 9.

◦ 송학동 기후대응 도시숲 착공	: 2023. 4. 5.

◦ 송학동 기후대응 도시숲 관련기관 협약 추진	: 2023. 4. 18.

▸익산시 - 농촌진흥청, 한국농업기술진흥원

< 오산면 기후대응 도시숲 >

◦ 오산면 기후대응 도시숲 실시설계 용역	: 2023.3. 2.~5. 30.

◦ 오산면 기후대응 도시숲 주민설명회	: 2023. 4. 14.

◦ 익산시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회	: 2023. 4. 20.

◦ 오산면 기후대응 도시숲 설계심의위원회	: 2023. 5. 23.

◦ 오산면 기후대응 도시숲 원가심사, 일상감사	: 2023. 6. 14.

◦ 오산면 기후대응 도시숲(1차분) 착공	: 2023. 6. 28.

□ 마무리 대책

◦ 송학동 기후대응 도시숲 준공	: 2023. 12.

◦ 오산면 기후대응 도시숲(1차분) 준공	: 2023. 12.

◦ 오산면 기후대응 도시숲(2차분) 착공 및 준공	: 2024. 1. ~ 12.

2		녹색자금 지원사업(무장애나눔길)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 신동 272번지 일원(원광대학교병원 일원, 4.3km)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(연차사업, 2023년 1구간, 2024년 2구간)

◦ 사 업 비 : 20억원(기금 12억원, 시비 8억원)

▸2023년–10억원(기금 6, 시비 4), 2024년–10억원(기금 6, 시비 4)

◦ 사업내용 : 보행약자가 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 산책로 조성
(자연식물원~원광대학교병원~원광대학교)

□ 추 진 실 적

◦ 무장애나눔길 실시설계 용역	: 2023. 2. 6.~4. 26.

◦ 원광대학교 관계자 현장답사 및 협의	: 2023. 2. ~ 5.

◦ 무장애나눔길 관련기관 협약 추진	: 2023. 3. 3.

▸익산시 - 원광대학교

◦ 무장애나눔길 설계심의위원회	: 2023. 5. 23.

◦ 무장애나눔길 계약심사	: 2023. 8. 1.

◦ 무장애나눔길(1구간) 착공	: 2023. 8. 21.

□ 마무리 대책

◦ 무장애나눔길(1구간) 준공	: 2023. 12.

◦ 무장애나눔길(2구간) 착공 및 준공	: 2024. 1. ~ 12.

3		500만 그루 나무심기 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 가로변, 공원, 완충녹지, 유휴토지, 학교 등 도심 전역

◦ 사업기간 : 2019. ∼ 2023.(5개년) → 2019. ~ 2025.(7개년)

※ 근린공원 민간특례사업 추진 일정에 맞춰 사업기간 변경

◦ 총사업비 : 363억원 / 23년 사업비 9,821백만원(국3,198 도1,179 시5,444)

◦ 사업내용 : 도시숲 등 수목 식재, 민간정원 및 공원 조성, 교육 프로그램 운영 등

◦ 연도별 식재 계획	(단위:주)

구분	실 적 (2,682,034주, 91.2%)				계 획			계
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계	418,114	734,208	537,007	992,705	1,193,926	816,335	359,386	5,051,681
공공	358,659	647,949	409,511	771,745	1,193,926	816,335	359,386	4,557,511
민간	59,455	86,259	127,496	220,960				494,170

□ 추 진 실 적

◦ 2023년 수목식재 사업 추진(1,181,178주 식재, 98.9%)     : 2023. 1. ~ 9.

▸공공부문(1,060,118주)

- 가로수 1개소, 유휴부지 수목식재 7개소, 자녀안심그린숲 2개소, 가로화단 정비 4개소, 학교숲 4개소, 정원조성 27개소, 생활밀착형 숲(실내) 1개소, 꽃길조성

11개소, 스마트가든 8개소, 조림 5개소, 공원정비, 협업부서 수목식재 등

▸민간부문(121,060주)

- 민간주택건설사업(소나무, 블루엔젤 등 65,812주)

- 1시민 1정원 프로젝트 테라스 정원 만들기(스킨답서스 등 30,000주)

- 민간정원 포멀가든 조성(회양목, 철쭉 등 9,200주)

- 산북천 기부수목 식재, 천호산 진입로 관목 식재 등(16,048주)

□ 마무리 대책

◦ 500만 그루 나무심기 사업 지속 추진	: 2023. 10. ~ 12.

▸기후대응 도시숲(송학동, 오산면), 도시숲(나룻가 등), 자녀안심그린숲, 유휴부지 수목식재(용안면 당하제 등)

◦ 500만 그루 나무심기 수목 등 유지관리	: 2023. 10. ~ 12.

4		꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 주요 도로변(익산대로 등) 및 교통섬, 꽃바람정원 등

◦ 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 707백만원(인건비 531, 재료비 113, 일반운영비 33, 시설비 30)

◦ 사업내용

▸자연친화 감성 꽃거리 조성(교통섬 등 주요 도로변 계절별 초화식재)

▸꽃향기 가득한 익산만들기를 위한 계절꽃 단지(정원) 조성(봄, 여름, 가을 3회)

▸꽃바람정원 조성 및 유지관리(정원 만들기 행사 2회, 계절꽃밭 2,000㎡)

□ 추 진 실 적

◦ 자연친화 감성 꽃거리 조성	: 2023. 3. ~ 9.

▸계절별 초화/관목 식재

- 팬지, 튤립, 금잔화, 메리골드, 백일홍, 금어초, 일일초, 에메랄드 그린 등

▸익산역~구경찰서, 익산역~터미널, 익산시청 주변 등 간이화단 5개소 꽃 식재

▸모현사거리 및 북부시장사거리 등 교통섬 10개소 꽃 식재

▸익산역 앞 등 4개소 꽃조경화단 꽃 식재

▸대형화분, 중형화분, 걸이화분 등 20개소 꽃 식재

◦ 꽃향기 가득한 익산만들기를 위한 계절꽃 단지(정원) 조성 : 3회(3월, 6월, 9월)

▸132개 기관/초화류 220천본 지원

◦ 꽃바람정원 만들기 행사(봄)

▸참여인원 160명(10천본 식재), 초화류 44천본 식재, 계절꽃밭(2,000㎡)

□ 마무리 대책

◦ 꽃바람정원 만들기 행사(가을)	: 2023. 10.

▸참여인원 160명(10천본 식재), 초화류 56천본 식재, 계절꽃밭(2,000㎡)

◦ 자연친화 감성 꽃거리 조성	: 2023. 11. ~ 12.

▸교통섬 구근류 식재

▸2024년 봄꽃 파종 및 유지관리

5		생활밀착형 숲 및 스마트가든 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 생활밀착형 숲 실내․외정원, 스마트가든

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,240백만원(국 120, 기 750, 시 370)

◦ 사업내용

구 분	주 요 내 용	사업비 (백만원)	비 고
계		1,240
생활밀착형 숲(실내)	익산시 북부청사 실내정원 및 옥상정원 조성	500	기 250, 시 250
생활밀착형 숲(실외)	망성면 행정복지센터 실외정원 조성 (시행주체 한수원)	500	기금
스마트 가든	산단 및 공공시설 내 조성 (국가식품클러스터 등 8개소)	240	국 120, 시 120

□ 추 진 실 적

◦ 생활밀착형 숲(북부청사 실내) 조성사업

▸실시설계 용역 추진, 자문단 컨설팅 및 계약심사        : 2023. 2.~ 5.

▸감리용역 및 사업 착공	: 2023. 6.

▸사업 준공	: 2023. 9

◦ 생활밀착형 숲(망성면 행정복지센터 실외) 조성사업 (한국수목원정원관리원)

▸설계용역 보조사업자 선정 및 추진	: 2023. 5.

▸설계에 대한 중간보고(기본구상 및 계획)	: 2023. 6. 14.

▸실외정원 실시설계 완료	: 2023. 8.

▸실외정원 조성 및 시민참여 정원프로그램 활동	: 2023. 9.~ 11.

◦ 스마트가든 설치사업

▸실시설계 용역 추진	: 2023. 2. ~ 3.

▸감리용역 및 사업 추진	: 2023. 3. ~ 5.

- 산업단지 4개소, 공공시설 3개소, 의료시설 1개소(3,671본 식재)

□ 마무리 대책

◦ 생활밀착형 숲(실내·외정원) 조성 및 유지관리      : 2023. 10. ~ 12.

◦ 스마트가든 보완사업 및 유지관리                 : 2023. 10. ~ 12.

6		어울림정원 만들기 및 민간정원 보완 사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 어울림 정원, 달빛소리 정원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 620백만원(도 12.5, 시 597.5, 자부담 10)

구 분	주 요 내 용	사업비 (백만원)	비 고
계		620
어울림 정원	신청 읍면동 행정복지센터 정원조성 ※ 개소당 1,250만원 지원(재료비 재배정)	570	시비
달빛소리 정원 (민간자본사업보조)	달빛소리 정원 내 유럽식 특화정원 조성 및 휴식공간 제공	50	도12.5, 시27.5 자부담 10

◦ 사업내용

□ 추 진 실 적

◦ 우리동네 어울림 정원 조성(24개소)

▸우리동네 어울림 정원만들기 종합평가	: 2023. 7.

▸우리동네 어울림 정원만들기 시상식 실시	: 2023. 8. 30.

- 기관․단체(최우수1, 우수4, 장려9), 개인(유공시민 23)

◦ 민간정원 보완사업(달빛소리정원)

▸지방보조금 교부신청서 제출 및 교부결정 통지    : 2023. 3.

▸달빛소리정원 보완사업 정산 보고서(자부담) 제출	: 2023. 4.

- 정원 내 분수․조명 설치, 부지정리 및 폐기물 처리 등

▸달빛소리정원 보완사업 정산 보고서(1차) 제출	: 2023. 5.

- 특화정원 및 산책로 조성(홍가시 식재, 조형물 설치, 야자매트 설치 등)

▸민간정원 보완사업 보조금(1차) 지급	: 2023. 6.

▸달빛소리정원 보완사업 정산보고서(2차) 제출	: 2023. 7.

- 특화정원 조성(황금사철 외 4종 5,150본 식재)

▸민간정원 보완사업 보조금(2차) 지급	: 2023. 7.

▸민간정원 보완사업 완료 및 정산	: 2023. 8.

□ 마무리 대책

◦ 정원 유지관리                                     : 2023. 10.~12.

◦ 2024년 우리동네 어울림 정원 대상지 신청 및 검토   : 2023. 10.~12.

7		가로수 조성 및 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸가로수 조성 : 목천동 대간선수로(목천교회~태강건설 방향), 0.7km

▸자녀안심 그린숲 조성 : 이리부천초·이리송학초, 0.5km

▸가로수 유지관리 : 하나로 등 138개 노선, 356km

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 2,330백만원(국비 2, 기금 100, 도비 300, 시비 1,928)

□ 추 진 실 적

◦ 가로수 조성사업 추진	: 2023. 1. ~ 6.

▸목천동 대간선수로 0.7km(느티나무 등 8종 149주, 남천 등 9종 10,270주 식재)

◦ 자녀안심 그린숲 조성사업 추진                       : 2023. 1. ~ 6.

▸이리부천초·이리송학초, 0.5km(왕벚나무 등 2종 20주, 미스김라일락 등 4종 702주)

◦ 가로수 유지관리                                  : 2023. 1. ~ 6.

▸가로수 보식(백제로 배롱나무 40주, 영등동·웅포면 등 관목 3,090주)

▸가로수 수형조절, 병해충 방제 및 민원처리 등

- 가로수 전지(무왕로 느티나무 등 2,422주), 융기된 뿌리정비, 민원처리

- 가로수 병해충 방제사업

[예방나무주사 : 무왕로 느티·왕벚나무 971주, 지상방제 : 익산대로 배롱나무 1,751주 (3회)]

□ 마무리 대책

◦ 가을철 가로수 보식사업 추진	: 2023. 10.~ 11.

◦ 가로수 유지관리 추진(은행 열매 채취, 전지작업 및 병해충방제)  : 2023. 10.~ 12.

8		배산공원 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 모현동2가 산9-1번지 일원 배산근린공원

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6.

◦ 총사업비 : 2,580백만원(‘22년 980백만원, ‘21년 1,600백만원)

◦ 사업내용

▸(1단계) 맞이공간 꽃길・화단 조성, 운동시설 정비(‘ 21.)

▸(2단계) 산책로 및 둘레길, 휴게・편익시설 정비 및 야간경관조명 설치(`21.~`22.)

▸(3단계) 배산공원 종합정비사업 추진(`22.~`23.)

□ 추 진 실 적

◦ 배산공원 공원등 정비사업 전기공사 완료	: 2022. 8. ~ 2023. 2.

▸야간보행을 위한 내부 둘레길 공원등 정비(2km)

◦ 배산공원 종합정비사업 완료	: 2022. 11.~ 2023. 6.

▸연주정 암벽구간 데크 설치 및 화장실 옆 계단 정비, 맞이공간 화단 조성 등

▸세족장, 먼지털이기 설치

◦ 배산공원 부지사용 재계약 협의 진행(2024~2028)     : 2023. 6. ~ 9.

◦ 「맨발걷기 활성화 및 지원에 관한 조례」 입안	: 2023. 8.

□ 마무리 대책

◦ 배산공원 부지사용 재계약 완료	: 2023. 11.

◦ 공원조성 시민 만족도 조사 및 하자 검사	: 2023. 12.

9		인화공원 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동2가 174번지 일원 (구)동익산역~춘포역(공원결정면적 137,816㎡ ) 인화공원

◦ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.

◦ 총사업비 : 1,600백만원(시비)

◦ 사업내용

▸인화공원 솜리메타누리길 조성사업(2차)(L=1.2㎞)	: 1,200백만원

▸인화공원 공공시설(화장실) 설치사업	: 400백만원

※ 연도별 조성현황

□ 총사업비 6,017백만원(국비 1,628, 도비 790, 시비 3,599) / 사업기간 : ’15. ~ ‘22.

단계	사업명	사업규모	사업기간	사업비 (단위:천원)
합 계				6,016,867
1	공원구역 결정 및 공원조성계획 수립		2015.~2017.	200,000
	남부권나눔숲	A=6,000㎡	2016.~2018.	435,000
2	다기능 힐링공원	A=10,000㎡	2017.~2019.	860,000
	명품 가로숲길	A=3,800㎡, L=0.95㎞	2017.~2019.	396,000
	여성화장실 사업	A=69㎡, 9칸	2017.~2019.	179,200
3	대규모 도시숲(1차)	A=11,300㎡, L=3.24㎞	2018.~2019.	1,000,000
4	대규모 도시숲(2차)	A=15,000㎡	2019.~2020.	1,000,000
5	무장애나눔길	A=4,671㎡, L=1.3㎞	2021.	666,667
6	솜리메타누리길 조명 설치	L=1.1㎞	2022.	480,000
7	대규모 도시숲(3차)	A=5,917㎡	2022.	400,000
8	인화 도시숲	A=5,550㎡	2022.	400,000

□ 추 진 실 적

◦ 솜리메타누리길 조성사업(2차) 실시설계 용역	: 2023. 1. ~ 4.

◦ 공공시설(화장실) 설치사업(금곡마을) 및 운동기구 설치	: 2023. 2. ~ 5.

◦ 공공시설(화장실) 설치사업(신평마을)	: 2023. 4. ~ 6.

◦ 솜리메타누리길 조성사업(2차) 추진(공정률 70%)    : 2023. 6. ~ 11.

□ 마무리 대책

◦ 솜리메타누리길 조성사업(2차) 준공	: 2023. 11.

◦ 공원조성 시민 만족도 조사	: 2023. 12.

10		장기미집행 공원 토지매입

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원 장기미집행공원

◦ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

◦ 총사업비 : 3,295백만원

▸함열·무학공원 : 1,800백만원

▸황등공원 : 695백만원(2022년 ; 500백만원, 2023년 : 195백만원)

▸신흥공원 : 800백만원

◦ 사업내용

구 분	필 지	면적(㎡)	비고
합 계	74	77,748
함열공원	11	29,755	사유지
무학공원	18	35,593	사유지
황등공원	41	11,198	사유지 16필지(2,303㎡), 국유지 25필지(8,895㎡)
신흥공원	4	1,202	사유지

□ 추 진 실 적

구 분	토지 보상		분묘 보상	비고
	필 지	면적(㎡)
합 계	26	25,065.67	14
함열공원	3	636		사유지
무학공원	4	15,523.67	8	사유지
황등공원	15	7,704	2	사유지, 국유지
신흥공원	4	1,202	4	사유지

※ 무학공원 분묘 재조사 용역 진행(2023. 6. ~ 2024. 4.)

□ 마무리 대책

◦ 장기미집행공원(함열, 무학, 황등공원) 토지  등 협의 보상 추진	: ~ 2024. 12.

◦ 무학공원 분묘 재조사 용역 완료 후 보상 추진	: ~ 2024. 12.