녹색도시조성과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 주 요 성 과
□	2024 주 요 업 무 계 획

일   반   현   황

□ 기        구

				녹색도시조성과
푸른숲조성			정원문화산업					가로수환경			공원조성

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	1	4	3	2	7
현 원	18	1	1	5	4	2	5	공무직2, 기간제1
증 감				1	1		△2

□ 사 무 분 장

◦ 푸른숲조성	:	도시숲 및 학교숲 조성, 기후대응 도시숲 조성사업, 녹색자금 지원사업, 학교공원화 사업, 산림서비스 도우미 지원, 녹색일자리 확충, 나무 나누어주기 사업 추진, 푸른익산 가꾸기 사업
◦ 정원문화산업	:	용안생태습지 지방정원 추진, 용안생태습지 초화류 식재, 꽃바람정원 조성(확장) 및 유지관리, 꽃양묘장 유지관리, 스마트가든 유지관리, 생활밀착형 숲 조성, 어울림정원 조성, 민간정원 및 수목원 유지관리
◦ 가로수환경	:	가로수(중앙분리대) 및 가로화단 조성ㆍ관리, 병해충 방제 (가로수,가로화단, 중앙분리대), 자녀안심 그린숲 조성, 생활권 수목진료 민간 컨설팅
◦ 공원조성	:	공원·녹지조성계획 수립 및 시행, 공원조성 및 재정비사업, 공원리모델링 사업, 공원 조성에 따른 보상 및 등기 업무,공원사업 시행 인·허가 및 실시계획인가, 공원녹지 일시사용 승인 및 점용허가

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 녹색도시 인프라 조성 사업 원활한 추진

‣수목 식재 1,336,397주(공공부문 1,203,996, 민간부문 132,401)

‣1시민 1정원 시민참여를 위한 테라스 정원 만들기(반려식물 30,000주)

‣【민간부문】제5차 시민의 숲 조성, 기부수목 식재 등

◦ 도시숲, 기후대응 도시숲 조성 및 관리로 쾌적한 녹색도시 미관개선

‣기후대응 도시숲 조성사업 3개소 국비(기금) 27.5억원 확보

‣도시숲 및 학교숲 조성사업 6개소 도비 7.5억원 확보

◦ 가로수, 명품가로숲길 및 자녀안심 그린숲 조성으로 녹색네트워크 구축 추진

‣목천동 대간선수로 가로수 0.7km(느티나무 등 17종 10,689주 식재)

‣이리부천초, 이리송학초 일원 자녀안심그린숲 (왕벚나무 등 6종 722주 식재)

◦ 아름다운 도시경관 조성사업 추진

‣자연친화적 감성 꽃거리 조성 : 모현사거리 교통섬 및 화단 등 39개소 꽃식재 추진

‣꽃향기 가득한 익산 만들기 : 132개 기관 및 단체 초화류 22만본 지원(3회)

‣꽃바람정원 행사, 조성 및 유지관리 : 초화류 12만본 식재, 계절꽃단지 조성 및 확장

◦ 실내․외 정원 조성 및 유지관리

‣생활밀착형 실내(북부청사), 실외(망성면 행정복지센터) 조성

‣스마트가든 조성 : 8개소(보건소 외 7개소)

‣우리동네 어울림 정원 조성 : 정원 24개소(왕궁면 외 22개소 참여)

◦ 도시공원 조성사업 추진

‣신흥공원 : 화단 조성사업, 경관 조명설치(볼라드등 45개, 반디등 20개 등)

행복정원 산책로 야자매트 설치

‣인화공원 : 공공시설(화장실) 설치사업(신평, 금곡)

인화공원 솜리메타누리길 조성사업(L=1.2km, 맨발산책로 조성)

□ 반      성

◦ 장기미집행공원 토지 보상 및 사업 추진 시 보상 협의에 따른 사업시행 지연

‣ 일몰제 공원의 공원 해지에 대비하여 적극적인 토지 협의 추진

◦ 예측불가능한 기후변화(태풍,폭염 등)로 공사지연 및 수목유지관리 어려움

‣ 적정 공사기간 부여 및 관수, 배수 등 적극적인 수목관리로 하자 최소화

		기후대응 도시숲 조성사업
		녹색자금 지원사업(무장애나눔길)
		도시숲 조성사업
		용안생태습지 지방정원 조성
		꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기
		생활밀착형 숲 및 어울림정원 조성
		가로수조성 및 유지관리
		공원리모델링 사업
		인화공원 조성사업
		장기미집행 공원 토지매입
		신흥공원 보행교 설치사업

2024 주요업무계획

1		기후대응 도시숲 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸ 오산면 오산리 1071번지 일원(장항선 폐철도, 4ha)

▸ 인화동1가 223번지 일원(전라선 폐철도, 5ha)

▸ 모현동1가 935번지 일원(모현공원, 0.5ha)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사 업 비 : 8,500백만원(기금 4,250백만원, 시비 4,250백만원)

▸ 2023년–1,000백만원, 2024년–5,500백만원, 2025년–2,000백만원

◦ 사업내용 : 미세먼지 저감 수목 식재, 산책로 및 쉼터 조성 등

<오산면>

◦ 위    치 : 오산면 오산리 1071번지 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(2023년 실시설계+사업, 2024년 사업)

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(기금 2,000, 시비 2,000)

▸2023년–1,000백만원, 2024년–3,000백만원

<인화동>

◦ 위    치 : 인화동1가 223번지 일원

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.(2024년 실시설계+사업, 2025년 사업)

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(기금 2,000, 지방채 1,000 시비 ,000)

▸ 2024년–2,000백만원, 2025년–2,000백만원

<모현공원>

◦ 위    치 : 모현동1가 935번지 일원

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사 업 비 : 500백만원(기금 250, 시비 250)

□ 추 진 계 획

<오산면>

◦ 오산면 기후대응 도시숲(2차분) 착공 및 준공	: 2024. 2. ~ 11.

<인화동>

◦ 인화동 기후대응 도시숲 실시설계 용역	: 2024. 1. ~ 6.

◦ 인화동 기후대응 도시숲 주민설명회	: 2024. 3.

◦ 익산시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회	: 2024. 4.

◦ 인화동 기후대응 도시숲 설계심의위원회	: 2024. 5.

◦ 인화동 기후대응 도시숲 계약심사	: 2024. 6.

◦ 인화동 기후대응 도시숲(1차분) 착공 및 준공	: 2024. 6. ~ 12.

◦ 인화동 기후대응 도시숲(2차분) 착공 및 준공	: 2025. 1. ~ 12.

<모현공원>

◦ 모현공원 기후대응 도시숲 실시설계 용역	: 2024. 1. ~ 6.

◦ 모현공원 기후대응 도시숲 주민설명회	: 2024. 3.

◦ 익산시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회	: 2024. 4.

◦ 모현공원 기후대응 도시숲 계약심사	: 2024. 5.

◦ 모현공원 기후대응 도시숲 착공 및 준공	: 2024. 5. ~ 11.

□ 기 대 효 과

◦ 장항선 복선전철 개통과 전라선 폐선(동익산역～춘포)에 미세먼지 저감 수목 식재, 산책로 및 쉼터 조성하여 시민들에게 몸과 마음을 치유할 수 있는 도시 공간 조성

◦ 기존 모현공원의 산책로 폭을 줄여 미세먼지 저감에 효과적인 그늘목(느티나무 등)을 식재하고 맨발산책로(세족장)를 조성하는 등 도심생활권 중심부에 위치한 대상지를 숲으로 조성하여 주민만족도 향상

2		녹색자금 지원사업(무장애나눔길)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 신동 272번지 일원(원광대학교병원 일원)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(연차사업, 2023년 1구간, 2024년 2구간)

◦ 사 업 비 :  2,000백만원(기금 1,200백만원, 시비 800백만원)

▸ 2023년–1,000백만원, 2024년– 1,000백만원

◦ 사업내용 : 보행약자가 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 산책로 조성

□ 추 진 계 획

◦ 무장애나눔길(2구간) 2차분 계약 시행	: 2024. 1.

[총공사비 : 816백만원 (도급액 : 641, 관급액 : 175)]

▸관급자재 : 흙콘크리트 3,439㎡, 등의자 48개, 안내판 및 점자안내판 4개

◦ 무장애나눔길(2구간) 착공 및 준공	: 2024. 1. ~ 12.

▸황토길 1.3km, 목재데크길 0.7km, 쉼터 7개소

◦ 무장애나눔길 전동휄체어(2개소) 충전기 설치	: 2024. 5. ~ 8.

□ 기 대 효 과

◦ 무장애나눔길 조성사업을 보행약자층과 일반 이용객이 함께 공유할 수 있는 산림복지서비스 실현의 장으로 활용

◦ 시민 누구나 쉽고, 안전하고, 편리하게 이용 가능한 숲길을 조성하여 숲에서 누릴 수 있는 정서 안정, 건강 증진 등의 혜택 제공으로 산림환경기능 증진에 기여

3		도시숲 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상：도시숲, 학교숲, 유휴부지 도시숲, 도시숲 및 교통섬 정비사업

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,900백만원(도비750, 시비 1,150)

◦ 사업내용

구 분	주 요 내 용	사업비 (백만원)	비 고
계		1,900
나룻가 도시숲	산책로 및 쉼터 조성, 도심 녹지축 조성 등 - 동산동 813-84번지 일원 (나룻가 도시숲 3차)	1,000	도비 500 시비 500
학교숲	학교공간을 활용하여 숲을 조성하여 환경개선 및 녹지량 확충 -익산고, 영등중, 부천중 용북초, 미륵초(5개교) ※ 개소당 100백만원	500	도비 250 시비 250
유휴부지 도시숲	유휴부지에 수목을 식재하여 녹지량 확충 - 익산교도소세트장, 공룡테마공원, 공공승마장, 도로옆 공터	200	시비
도시숲 및 교통섬 정비사업	송학동 기후대응 도시숲 내 편의시설 등 설치 - 화장실 1개소, 운동기구 5개	200	시비

□ 추 진 계 획

<나룻가 도시숲>

◦ 나룻가 도시숲 조성사업 실시설계용역	: 2024. 1. ~ 3.

◦ 한국농어촌공사 익산지사 설계(안) 협의	: 2024. 3.

◦ 나룻가 도시숲 조성사업 설계심의	: 2024. 4.

◦ 나룻가 도시숲 조성사업 원가심사	: 2024. 5.

◦ 나룻가 도시숲 조성사업 시행	: 2024. 6. ~ 11.

<학교숲>

◦ 2024년 학교숲 조성사업 선정 안내(선정학교통보)	: 2024. 1.

◦ 학교숲 조성사업(5개교) 실시설계 용역	: 2024. 1. ~ 3.

※ 설계 시 학교 관계자 및 주민 의견 청취, 지침 내 의견 반영

◦ 상반기 학교숲 조성사업 하지검사 실시	: 2024. 3. ~ 4.

◦ 학교숲 조성사업(5개교) 시행	: 2024. 4. ~ 6.

◦ 하반기 학교숲 조성사업 하지검사 실시	: 2024. 10. ~ 11.

<유휴부지 도시숲 >

◦ 유휴부지 도시숲 조성 사업  실시설계	: 2024. 1. ~ 3.

◦ 유휴부지 도시숲 조성 사업 착공 및 준공	: 2024. 4. ~ 11.

◦ 유휴부지 도시숲 조성 사업 수목 유지관리	: 2024. 7. ~ 12.

<도시숲 및 교통섬 정비사업>

◦ 도시숲 및 교통섬 정비사업 실시설계	: 2024. 1. ~ 4.

◦ 도시숲 및 교통섬 정비사업 착공 및 준공	: 2024. 5. ~ 10.

※ 수목제거(이식) 협의 지침 수립	: 2024.1.

◦ 협의범위

▸수목(수종)변경, 수목 제거 및 이식을 포함한 각종사업

◦ 대    상

▸가로수 및 가로화단, 띠녹지 내 수목

▸도시숲(경관숲, 학교숲 등), 생활숲(마을숲 등) 내 수목

▸유휴부지 수목식재 쉼터, 산업단지 내 수목

▸보호수․노거수에 준하는 수목

□ 기 대 효 과

◦ 시민의 보건ㆍ휴양 증진 및 정서 함양에 기여하고, 미세먼지 저감, 폭염 완화 등으로 생활환경을 개선

◦ 탄소흡수 기능을 유지ㆍ증진하는 등 시민 삶의 질 향상

4		용안생태습지 지방정원 조성

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 용안면 난포리 311-5번지 일원(용안생태습지)

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,349백만원(인건비 343, 시설비 551, 재료비 등 155, 용역비 300)

◦ 사업내용 : 기본 및 실시설계 용역, 공간별 경관시설물 설치 및 계절꽃 식재 등

□ 추 진 계 획

◦ 지방정원 조성사업 기본 및 실시설계용역 (300백만원)

▸용역계약심사 및 계약 발주                      : 2024. 1.

▸입찰공고 및 적격자 심사                        : 2024. 2. ~ 3.

▸용역 시행                                      : 2024. 4. ~ 12.

◦ 초화류 식재 및 유지관리 (1,049백만원)             : 2024. 2. ~ 11.

▸유채, 코스모스 등 계절꽃 군락지 조성, 포토존 및 안내표지판 등 설치

▸금계국, 수생식물(노란꽃창포, 붓꽃 등) 식재 및 유지관리 등

▸중앙광장 간이화단 조성, 화분 제작 및 설치사업 추진

□ 기 대 효 과

◦ 기본 및 실시설계로 익산의 자연을 품은 지방정원 조성사업 공간별 사업비 확정

◦ 천혜의 자연환경과 익산 정원문화가 만나 새로운 명품경관 조성 기틀 마련

5		꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 주요 도로변(무왕로 등) 및 교통섬, 꽃바람정원 등

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 794백만원(인건비 582, 일반운영비 36, 재료비 133, 시설비 43)

◦ 사업내용

▸자연친화 감성 꽃거리 조성(교통섬 등 주요 도로변 계절별 초화식재)

▸시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진(봄, 여름, 가을 3회)

▸꽃바람정원 확장 조성 및 유지관리(정원 만들기 행사 1회, 계절꽃밭 5,000㎡)

□ 추 진 계 획

◦ 자연친화 감성 꽃거리 조성	: 2024. 1. ~ 12.

▸위치 : 40개소(교통섬 11, 간이화단 5, 꽃조경화단 4, 걸이 화분 20)

▸수량 : 꽃 생산 및 양묘 120만본 / 백일홍 외 20종

◦ 꽃향기 가득한 익산만들기를 위한 계절꽃 단지(정원) 조성	: 3회(3월, 6월, 9월)

▸약 120개 기관 / 초화류 21만본 지원

◦ 코스모스 꽃길조성(6.4km)	: 2024. 7. ~ 9.

▸삼기교차로~미륵사지 방향 1.4km, 만경강(호남고속철도~용강제~춘포공원 방향) 5km

▸포토존 및 안내표지판 등 설치

◦ 덕기동 양묘장(3연동 1개) 보수 및 편의시설 설치	: 2024. 1. ~ 5.

▸양묘장 피복공사, 화장실 및 근로자 휴게시설 설치 등

◦ 꽃바람정원 조성(확장), 정원만들기 행사 및 유지관리 : 2024. 2. ~ 12.

▸시민과 함께하는 꽃바람정원만들기 행사(봄 : 4월)

▸계절꽃밭(봄꽃, 가을꽃) 조성(5,000㎡)

□ 기 대 효 과

◦ 주요 도로변 및 정원 계절별 초화/관목 식재로 아름다운 녹색정원도시 이미지 개선

◦ 시민 참여 활성화로 시민과 함께하는 아름다운 녹색정원도시 조성

6		생활밀착형 숲 및 어울림정원 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 생활밀착형숲, 어울림 정원, 아가페 정원

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 830백만원(균특 250, 시비 580)

◦ 사업내용

구 분	주 요 내 용	사업비 (백만원)	비 고
계		830
생활밀착형 숲(실내)	영등도서관 실내정원 조성 (바이오리움, 정원북카페, 녹색 휴식공간 조성)	500	균특 250 시비 250
어울림 정원	신청 읍·면·동 행정복지센터 20개소 정원조성 ※ 개소당 13백만원 지원	260	시비
아가페 정원	정원 보완사업 추진	70	시비

□ 추 진 계 획

◦ 생활밀착형 숲(실내)

▸실시설계 용역 및 협의	: 2024. 2. ~ 4.

▸한국수목원정원관리원 컨설팅 및 계약심사	: 2024. 4.

▸사업착공 및 준공	: 2024. 5. ~ 10.

◦ 어울림 정원 조성

▸사업 대상지 신청 및 선정	: 2024. 1. ~ 2.

▸디자인 구상, 공동체의견 반영 및 실시설계	: 2024. 2. ~ 3.

▸사업착공(관목, 초화류 등 지역공동체 직접 식재)및 준공	: 2024. 3. ~ 6.

▸종합평가(평가위원회 구성후 서면 및 현장평가) 및 포상	: 2024. 9. ~ 10.

◦ 아가페 정원 보완사업

▸실시설계 용역 및 협의	: 2024. 1. ~ 2.

▸계약심사	: 2024. 3.

▸사업착공 및 준공	: 2024. 3. ~ 4.

□ 기 대 효 과

◦ 읍·면·동별 시민참여 어울림정원을 조성하여 정주여건 개선 및 체험기회 제공

◦ 생활권 주변 국·공유지 등에 다양한 유형의 정원을 조성해 생활 속 녹색공간 확충

7		가로수 조성 및 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸가로수 조성 : 목천동 대간선수로(1급새한자동차공업사~목상교), 0.7km

▸자녀안심 그린숲 조성 : 익산왕북초, 0.5km

▸가로수 유지관리 : 하나로 등 137개 노선, 344km

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 2,277백만원(균특 100, 도비 300, 시비 1,877)

◦ 사업내용 : 가로수 및 자녀안심 그린숲 조성, 유지관리

□ 추 진 계 획

◦ 가로수 및 자녀안심 그린숲 조성사업

▸설계 용역, 계약심사 등 행정절차 이행	: 2024. 1. ~ 2.

▸공사 착공 및 준공	: 2024. 3. ~ 6.

▸유지관리 등 추진	: 2024. 6. ~ 12.

◦ 가로수 유지관리

▸가로수 수형조절(지하고 높임, 가지 솎아주기), 융기된 뿌리정비, 열매(은행) 제거, 가로수 보식 및 민원처리	: 2024. 2. ~ 12.

▸가로화단 관리(보식, 제초 및 전지 등)	: 2024. 3. ~ 12.

◦ 가로수 병해충 방제 추진                          : 2024. 2. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 쾌적한 가로환경 조성으로 도심권 내 녹지공간 확보 및 녹색 인프라 확대

◦ 체계적인 가로수 유지관리를 통한 안전하고 아름다운 도시경관 창출

8		공원리모델링 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

◦ 총사업비 : 1,860백만원

◦ 사업내용

▸공원 공공시설 개선사업(부송, 약촌어린이공원)	: 560백만원

- 놀이시설, 벤치 등 휴게시설 개선

▸공원 노후시설 정비사업(인화, 소신, 익산초어린이공원)	: 500백만원

- 놀이터 및 바닥포장 보수, 식재 정비

▸배산보훈공원 산책로 조성사업 (A=1,700㎡)	: 500백만원

▸춘포공원 수생식물 정비사업 (L=600m, B=30m)	: 300백만원

- 수로 준설(A=18,000㎡), 수생식물(갈대, 연꽃 등) 식재

□ 추 진 계 획

◦ 공원리모델링 사업 실시설계 용역	: 2024. 1. ~ 4.

▸공원 공공시설 개선사업

▸공원 노후시설 정비사업

▸배산보훈공원 산책로 조성사업

▸춘포공원 수생식물 정비사업

◦ 공원리모델링 사업 시행	: 2024. 5. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 노후 시설의 리모델링을 통해 시민들의 불편 해소 및 삶의 질 향상

9		인화공원 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 인화동2가 174번지 일원

(구)동익산역~춘포역(공원결정면적 137,816㎡ ) 인화공원

◦ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 12.

◦ 총사업비 : 650백만원(도비 300, 시비 350)

◦ 사업내용

▸인화공원 솜리메타누리길 정비사업	: 300백만원

▸인화공원 ~ 춘포역 산책로 조성사업	: 350백만원

※ 2015 ~ 2023 총사업비 7,617백만원

단계	사업명	사업규모	사업기간	사업비 (단위:천원)
합 계				7,617,000
1	기 조성구간		2015.~2022.	3,221,000
2	명품 가로숲길	A=3,800㎡, L=0.95㎞	2017.~2019.	396,000
3	대규모 도시숲(1차~3차)	A=32,217㎡	2018.~2022.	2,400,000
4	화장실 설치사업	2개소(신평, 금곡)	2023.	400,000
5	솜리메타누리길 2차	L=1.2km	2023.	1,200,000

□ 추 진 실 적

◦ 인화공원 솜리메타누리길 정비사업 실시설계 용역	: 2023. 10. ~ 12.

□ 추 진 계 획

◦ 인화공원 솜리메타누리길 정비사업 시행	: 2024. 1. ~ 6.

◦ 인화공원 ~ 춘포역 산책로 조성사업 실시설계용역	: 2024. 1. ~ 3.

◦ 인화공원 ~ 춘포역 산책로 조성사업 시행	: 2024. 4. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 폐철도부지를 활용한 공원조성으로 녹색공간 확충 및 휴식공간 제공

10		장기미집행 공원 토지매입

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원 장기미집행공원

◦ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

◦ 총사업비 : 3,095백만원

▸함열·무학공원	: 1,100백만원

- 함열공원 확보 비율 : 41.9%(21필지,  27,371㎡)

- 무학공원 확보 비율 : 69.6%( 6필지, 134,345㎡)

▸황등공원(확보 비율 94.7%(74필지, 36,554㎡))	:   195백만원

▸신흥공원(확보 비율 72.9%(36필지, 62,066㎡))	: 1,500백만원

▸배산공원 부지사용 계약료	:   300백만원

- 계약 면적 비율 74.5%(40필지, 257,369㎡)

※ 2020년 실시계획인가 기준

◦ 사업내용 : 38필지, 67,707㎡ 토지 및 지장물 보상

▸함열공원 :  8필지, 29,119㎡ (사유지)

▸무학공원 : 15필지, 21,519㎡ (사유지), 분묘 37기

▸황등공원 : 14필지,   805㎡ (사유지), 분묘 1기

▸신흥공원 :  1필지, 16,264㎡ (사유지)

□ 추 진 계 획

◦ 무학근린공원 분묘 재조사 용역	: 2023. 6. ~ 2024. 4.

◦ 편입 토지 감정평가 실시(신흥공원)	: 2024. 1. ~ 2.

◦ 편입 토지 협의매수 및 수용	: 2024. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 장기미집행 도시계획시설 사업 추진을 통해 장기간 사유재산권 침해에 따른 재산권 보장

◦ 지역주민들에게 휴식공간을 제공하여 건전한 여가활용과 삶의 질 향상에 기여

11		신흥공원 보행교 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 어양동 43-1번지 일원(신흥공원)

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

◦ 총사업비 : 5,000백만원

▸ 2024년 : 300백만원 (보행교 설치사업 설계용역비)

※ 2024년 추경예산 시설비 확보 : 1,000백만원

▸ 2025년 : 3,700백만원 (보행교 설치사업)

◦ 사업내용 : 신흥공원 보행교 설치사업 (L=50m, B=5.0m)

□ 추 진 계 획

◦ 교통,환경,재해영향평가 행정절차 이행	: 2024. 1. ~ 3.

◦ 건설과 협의 (국토교통부)	: 2024. 1. ~ 2.

◦ 보행교 디자인, 경관, 공법, 설계 심사	: 2024. 2. ~ 4.

◦ 신흥공원 보행교 설치사업 실시설계 용역	: 2024. 4. ~ 11.

◦ 신흥공원 보행교 설치사업 시행	: 2024.. 11. ~ 2025. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 도심권 내 시민 여가 휴식 공간 제공을 통한 지역주민의 삶의 질 향상 기여

◦ 동선 연결을 통한 국화축제 공간 확대 및 시민들에게 풍성한 볼거리를 제공하여 신흥공원 관광 활성화