건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 주 요 성 과
□	2024 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모

일   반   현   황

□ 기        구

					건설과
도로시설			도로기반					하천시설				하천관리

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19		1	4	7	4	3
현 원	20 (정원외 1)		1	5	6 (정원외 1)	3	5
증 감	1		-	1	△1	△1	2

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설계	:	시도 및 농어촌도로 확·포장사업, 철도건널목개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등 업무지원
	◦	도로기반계		소규모주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비공사, 비법정도로 확포장공사 등
	◦	하천시설계	:	하천기본계획수립, 지방하천환경정비사업, 소하천정비사업
	◦	하천관리계	:	하천유지관리(국가,지방,소하천), 용안생태습지유지관리 만경강 친수시설 유지관리, 하천점용허가 및 골재채취허가

□ 도 로 현 황

구 분	계	시 도	농어촌도로
노 선 수	1,551	1,264	287.0
연장(km)	1,088.6	508.6	580.0
확포장(km)	957.4	415.4	542.0
포장률(%)	87.9	81.6	93.4

□ 하 천 현 황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비 대상	개수 연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	91	333.493	89	323.863	333.493	163.787	169.706	49.1%
국가하천	3	42.19	3	42.19	42.19	42.19	-	100%
지방하천	26	189.1	24	179.47	189.1	92.41	96.69	48.9%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	29.187	73.016	28.5%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
1,339	424	-	915	3,001,772	230,300	-	2,771,472

□ 차량보유 현황

하천관리차량

94버6749 전기1톤트럭 1대, 오토바이 1대

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 시도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민편익 증대

▸금마 갈산~서편간 도로확포장공사(2차분)(L=1.6km,B=8.0m) 준공	: 2023.  4.

▸낭산농협~시명마을간 선형개량공사(L=0.2km,B=8.0m) 준공	: 2023.  8.

▸황등 도선~외화 도로확포장공사(L=0.4km,B=8.0m) 준공	: 2023.  9.

▸어양 어곳~부평간 도로확포장공사(1공구)(L=0.8km,B=8.0m) 준공	: 2023. 10.

▸춘포 오룡선 도로확포장공사(1차분)(L=0.2km,B=8.0m) 준공	: 2023. 12.

▸왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장공사(1차분)(L=0.2km,B=8.0m) 준공	: 2023. 12.

▸익산시 도로건설관리 및 농어촌도로 기본정비계획(변경) 완료	: 2023. 12.

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

▸소규모 주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비 등 민원 처리	: 273건

◦ 지방하천 정비사업을 통한 주변지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

▸동면천 하천정비공사(2차분) 준공	: 2023. 12.

◦ 관내 지방하천(27개소) 및 소하천(62개소) 유지보수를 통한 안전하고 쾌적한 하천환경 조성

▸하천준설 : 오동정천 외 10건 / 제방보수(포장, 보수 등) : 익산천 외 6건

◦ 7월 호우피해 응급복구 완료

▸산북천 외 23개소(지방하천 11, 소하천 11, 국가하천 2)

□ 반      성

◦ 도로개설 편입토지 중 부분적으로 토지수용재결 등 협의매입이 지연되어  예산집행 및 사업추진이 다소 저조함

▸토지수용재결 등 협의매입이 완료된 구간은 예산을 확보하여 적기에 공사가 추진 될 수 있도록 노력하겠음

		시도 및 농어촌도로 확포장
		서수~평장간 국도대체우회도로 개설
		생활여건개선을 위한 주민숙원사업
		지방하천 동면천 정비사업
		진사소하천 정비사업
		황각소하천 정비사업
		연화소하천 자연재해위험개선지구 정비사업
		외두소하천 정비사업
		만경강 친수시설 유지관리
		금강 용안생태습지 유지관리
		하천제방 유지관리
		만경강 목천지구 파크골프장 증설사업

2024 주요업무계획

1		시도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 13개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2028. 12.

◦ 사업규모 : 26개사업 L=15.46km, B=8.0~24.0m

(공사추진 8개노선, 토지보상 14개노선, 실시설계 4개노선)

◦ 총사업비 : 40,209백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투 자	2024년	2025년 이후	비 고
40,209	10,431	7,329	22,449

□ 추 진 계 획

◦ 공사 8개노선 추진	: 2024. 1. ~ 12.

▸지방도 1개노선, 시도 1개노선, 농어촌도로 6개노선

◦ 토지보상 14개노선 추진(수용재결 병행)	: 2024. 1. ~ 12.

▸지방도 2개노선, 시도 3개노선, 농어촌도로 9개노선

◦ 실시설계 4개노선 추진	: 2024. 1. ~ 12.

▸농어촌도로 4개노선

□ 기 대 효 과

◦ 농어촌지역 주민의 교통편익과 농수산물의 생산·유통성을 향상시켜 지역경제 활성화 기여

2024년도 노선별 추진 계획

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2028. 12.

◦ 사업개요 : 도로확포장 L=15.46km, B=8.0~24.0m

(공사추진 8개노선, 토지보상 14개노선, 실시설계 4개노선)

◦ 총사업비 : 26개사업 / 40,209백만원 (2024년 예산 7,329)

◦ 노선별 추진상황

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	24년 예산액 (이월예산포함)	25년 이후
계	26개 사업			L=15.46km B=8.0~24.0m	40,209	10,431	7,329	22,449
공 사 (8)	지방도 (1)	723호	웅포 송천사거리 회전교차로설치	회전교차로 1식	400	25	375	-	도비50% 명시375
	시 도 (1)	1268호	어양어곳~부평간 도로확포장(2공구)	L=0.40km B=8.0m	2,050	1,260	452	338	공정률 50% 본예산190 명시234 사고28
	농어촌 도 로 (6)	성당104호 (삼회선)	성당삼회선 도로구조개선사업	회전교차로 1식	400	18	382	-	공정률 10% 본예산343 명시39
		금마101호 (서삼선)	금마갈산~서편간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	2,759	1,744	1,015	-	공정률 80% 본예산980 사고35
		춘포311호 (노적선)	춘포노적선 진입도로확포장	L=0.40km B=8.0m	1,133	817	316	-	공정률 85% 명시316
		삼기203호 (석라선)	하나로~소간촌간 도로확포장	L=1.60km B=8.0m	3,400	876	524	2,000	공정률 25% 본예산300 사고224
		춘포102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.50km B=8.0m	1,500	276	539	685	공정률 20% 본예산500 사고39
		왕궁102호 (농장선)	왕궁금오동~군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	223	377	400	공정률 20% 본예산300 명시77

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	24년 예산액 (이월예산포함	25년 이후
보 상 (14)	지방도 (2)	723호	함열상마사거리 회전교차로	회전교차로 1식	800	24	276	500	도비50% 명시276
		799호	여산두여삼거리 회전교차로 설치	회전교차로 1식	500	25	375	100	도비50% 명시375
	시 도 (3)	15호	오산면소재지 진입도로확포장	L=0.85km B=24.0m	5,000	1,982	751	2,267	보상률 63% 명시700 사고51
		1201호	하나로~외화간 도로확포장	L=1.55km B=8.0m	3,780	1,183	47	2,550	보상율 65% 사고47
		1249호	금마신정~중왕간 도로확포장	L=1.20km B=8.0m	2,450	870	30	1,550	보상률 77% 사고30
	농어촌 도 로 (9)	춘포 203호 (창평선)	춘포창평마을 진입도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,400	78	52	1,270	사고52
		함라 312호 (행진선)	함라행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	319	181	1,570	보상률 43% 사고181
		망성 201호 (신하선)	망성신하선 도로확포장	L=0.65km B=8.0m	1,000	34	66	900	사고66
		황등 212호 (상동선)	상동선(황등하동~ 동연지하차도) 도로확포장사업	L=0.63km B=8.0m	1,250	502	480	268	보상률 40% 명시400 사고80
		낭산 102호 (남천선)	장암사거리 회전교차로	회전교차로 1식	500	23	27	450	명시27
		금마 303호 (종구선)	금마종구선 도로확포장	L=0.60km B=8.0m	1,500	50	100	1,350	명시100
		삼기 308호 (만대선)	삼기만대선 도로확포장	L=0.80km B=8.0m	1,200	40	40	1,120	명시40
		황등 102호 (상다선)	황등상다선 도로선형개량	L=0.30km B=8.0m	500	-	280	220	도비50% 본예산200 명시80
		낭산 101호 (하맹선)	낭산 맹동마을~용성 초교 도로확포장	L=0.20km B=8.0m	500	18	2	480	명시2
실 시 설 계 (4)	농어촌 도 로 (4)	망성105 (안성선)	망성면 행정복지센터 앞 회전교차로 설치	회전교차로 1식	500	-	400	100	신규 도비50%
		삼기207 (기산선)	삼기면 원기산마을 소교량 정비사업	교량정비 1식	117	-	117	-	신규 도비30%
		함라210 (천남선)	함라천남길 도로확포장공사	L=0.40km B=8.0m	1,000	-	59	941	사고 59
		웅포101 (녹차 마을선)	국립익산 치유의숲 진입도로 확포장	L=1.10km B=8.0m	3,500	44	66	3,390	명시 66

2		서수~평장간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

▸1공구 : 황등면 신기리, 황등리, 삼기면 용연리, 월성동, 임상동 일원

▸2공구 : 삼기면 용연리, 금마면 갈산리, 용순리, 서고도리, 동고도리, 덕기동 일원

◦ 사업기간 : 2021. ~ 2028.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 3,242억원(국3,075 시167)

(단위 : 억원)

구분	총사업비	기 투 자	2024년	2025년 이후	비 고
계	3,242	698	742	1,802
국비	3,075	639	655	1,781
시비	167	59	87	21	본예산 84억 명시 3억

※ 1공구 85억, 2공구 82억

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청 (익산시→동지역 토지보상)

▸공사 공정율 : 1공구(6%), 2공구(9%)

▸토지 보상율 : 1공구(3%), 2공구(100%)

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 보상협의 (1공구)	: 2024. 1. ~  6.

◦ 수용재결 신청에 따른 보상금 공탁 (2공구)	: 2024. 3. ~  6.

◦ 수용재결 신청 (1공구)	: 2024. 6. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국도대체우회도로개설에 따른 교통정체 및 혼잡구간 해소 및 도심 지역 원활한 교통 소통 도모

◦ 호남고속도로와 서해안 고속도로 연결로 지역 균형발전 및 간선도로망 확충으로 광역 교통물류 체계 구축

3		생활여건개선을 위한 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사업대상

사 업 명	사 업 량(건)			사 업 비(백만원)			비고
	계	본예산	이월	계	본예산	이월
합 계	164	146	18	4,502	2,176	2,326
소규모주민숙원사업	84	84		591	591
마을안길노후도로정비	71	62	9	2,444	1,585	859	명시
교통사고 잦은곳 개선사업	3		3	890		890	명시
지역밀착형참여사업 (마을안길)	1		1	78		78	명시
자연재난 응급복구	3		3	102		102	명시
남부권 순환형 힐링 보행로 조성	1		1	300		300	사고
(구)농업진흥원 일원 힐링 보행로 조성	1		1	97		97	사고

□ 추 진 계 획

◦ 사업대상지 현지 조사 및 설계 추진	: 2024. 1. ~  6.

◦ 관련기관 협의 등 행정절차 이행	: 2024. 1. ~  6.

▸토지사용승낙 등

◦ 공사(용역) 발주 및 준공	: 2024. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 지역주민 참여로 선정된 마을안길 생활여건개선 사업의 추진으로 주민참여예산 활성화 및 주민생활 불편 해소

◦ 마을안길 노후도로 포장에 따른 안전사고 예방 및 주민생활편익 증진 기여로 주민 삶의 질 개선 기대

4		지방하천 동면천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=3.05㎞

◦ 사업내용 : 제방축조 및 보축(L=6.1㎞), 교량 재가설(7개소) 등

◦ 총사업비 : 16,195백만원(도 11,337 시 4,858)

▸토지 보상율 : 98.7%(226필지중 223필지 매입완료)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2024년도	비 고
16,195	7,793	8,402

▸2024년 본예산액 : 6,177백만원 (도 4,324 시 1,853)

□ 추 진 계 획

◦ 동면천 하천정비공사 3차분 추진	: 2024.  3. ~ 12.

▸보축(L=6.1㎞) 및 제방 포장, 교량 4개소

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

5		진사소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 일원(가람문학관)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.687㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 및 보축 L=0.6㎞, 교량 재가설 3개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 1,610백만원(설계 134, 보상 300, 공사 1,176)

▸토지 보상율 : 28.6%(42필지중 12필지 매입완료)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2024년도	비 고
1,610	655	955

▸2024년 본예산액 : 110백만원 (시비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 등 협의보상 완료	: 2024.  3.

◦ 진사소하천 정비공사 준공	: 2024. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

6		황각소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 신용리 123-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=0.753㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=0.632km, 교량 재가설 4개소, 낙차공 3개소 등

◦ 총사업비 : 2,000백만원(설계 150, 보상 350, 공사 1,500)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2024년도	비 고
2,000	131	1,869

▸2024년 본예산액 : 600백만원 (시비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 감정평가 및 보상 협의	: 2024.  1.

▸편입토지 : 42필지 13,709㎡

◦ 황각소하천 정비공사 추진	: 2024.  3. ~ 2025. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

7		연화소하천 자연재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함라면 다망리 1125-23번지 일원

◦ 사업기간 : 2024.  1. ~ 2027. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=2.73㎞

◦ 사업내용 : 제방축제 L=5.194㎞ 및 보축 L=0.264㎞, 교량 재가설 11개소 등

◦ 총사업비 : 19,800백만원(국 9,900 도 3,960 시 5,940)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2024년도	2025년 이후	비 고
19,800	0	1,400	18,400

▸2024년 본예산액 : 1,400백만원 (국 700 도 280 시 420)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 및 환경영향평가용역 발주	: 2024.  1. ~  3.

◦ 실시설계 및 환경영향평가용역 착수 및 완료	: 2024.  3. ~ 12.

◦ 편입토지 보상 및 공사 추진	: 2025.  1. ~ 2027. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우시 지속적인 침수피해 발생이 우려됨에 따라 하천 재해위험개선지구 정비를 통해 주민의 재산 및 인명 피해 보호

8		외두소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 성당면 두동리 1145번지 일원

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=1.002㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축, 교량 재가설 등

◦ 총사업비 : 5,129백만원(설계 200, 보상 460, 공사 4,469)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2024년도	2025년 이후	비 고
5,129	0	890	4,239

▸2024년 본예산액 : 890백만원 (시비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 및 환경영향평가용역 발주	: 2024.  1. ~  3.

◦ 실시설계 및 환경영향평가용역 착수 및 완료	: 2024.  3. ~ 12.

◦ 편입토지 보상 및 공사 추진	: 2025.  1. ~ 2026. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

9		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=18km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 위    치 : 6개지구(신지, 목천, 춘포, 화전, 반월, 마산)

◦ 주요시설

▸자전거도로(21.71km), 파크골프장, 축구장, 야구장, 족구장, 농구장, 인라인장 등

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 친수시설관리, 제방도로 및 자전거도로 제초, 시설물보수 등

◦ 총사업비 : 623백만원 (국 416 시 207)

□ 추 진 계 획

◦ 만경강 친수시설 유지관리, 환경정비사업	: 연 중

◦ 침수우려 취약도로 자동차단시설 설치	: 2024. 2. ~  5.

▸만경강 철교 언더패스 1개소(목천배수펌프장 앞)

◦ 지장수목 제거 및 유지준설(만경강 문화관 앞, 구담교 주변)	: 2024. 3. ~ 11.

◦ 만경강 제방, 산책로, 자전거도로 제초	: 2024. 5. ~ 10.

□ 기 대 효 과

◦ 친수시설 유지보수를 통하여 안전하고 쾌적한 하천환경 조성 기여

10		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 주요시설 : 축구장 1면, 족구장 2면, 주차장, 산책로, 화장실 2개소,
관찰데크 및 생태습지 6개소 등

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초, 노후시설물 보수 등

◦ 총사업비 : 392백만원 (국 375 시 17)

□ 추 진 계 획

◦ 보수·보강시설물 실시설계	: 2024. 1. ~  2.

▸성당포구 목교, 노후 데크 및 화장실 등

◦ 편의시설 및 조경시설 보수·보강	: 2024. 4. ~ 11.

◦ 금강 용안생태습지 산책로 및 금강 자전거도로 제초	: 2024. 5. ~ 10.

◦ 금강 용안생태습지 시설물 유지관리, 환경정비사업	: 연 중

□ 기 대 효 과

◦ 용안생태습지 기반시설 및 편의시설 기능을 보강하여 관광활성화 기여

11		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 187.2km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

▸하천준설 및 정비 : 외성천 하천준설공사 외 6건, 익산천 제방포장 및 정비, 민원처리 등

▸제초 및 예초 : 제방 제초작업 및 수목제거 등

▸안전점검 : 하천시설물 22개소 정기안전점검(상반기·하반기 실시)

▸지방하천 및 소하천 환경정비사업

◦ 총사업비 : 2,454백만원(도 510 조 130 특 500 시 1,314)

□ 추 진 계 획

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리, 환경정비사업	: 연  중

◦ 하천준설, 제방포장 및 정비	: 2024. 2. ~ 5. / 9. ~ 11.

◦ 제방 및 호안 제초·예초	: 2024. 5. ~ 10.

◦ 하천시설물 22개소 정기안전점검	: 상반기 / 하반기

▸제방 : 만경강 목천지구 외 4개소(만경강 2, 강경천 3)

▸수문 및 통문 : 여산면 원수우안1지구 외 16개소(강경천 11, 왕궁천 6)

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우 등 자연재해시 하천으로 인한 피해를 사전에 예방하고 이를 통하여 안전한 하천시설 및 쾌적한 하천환경 조성 기여

12		만경강 목천지구 파크골프장 증설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 목천리 655-13번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 10.

◦ 사업내용 : 파크골프장 18홀 증설(34,053㎡), 주차장 149면(장애인 10면포함),종합안내판 1개소, 클럽하우스 1개소, 등의자 4개소, 화장실 1개소

◦ 총사업비 : 1,896백만원(특 900 시 996)

▸기투자 134백만원 / 2024년 1,266백만원(사고 766, 당해 500) / 금후 496백만원

□ 추 진 계 획

◦ 공사 완료(1차분)	: 2024. 3.

◦ 공사 착공 및 준공(2차분)	: 2024. 3. ~ 5.

◦ 사업비 제1회추경 예산 확보 및 마무리 공사 추진(잔여분)	: 2024. 6. ~ 10.

□ 기 대 효 과

◦ 만경강 친수공간에 시민들의 다양한 레저 및 체험공간 제공으로  기설치된 파크골프장 18홀과 연계한 생활체육의 집약 및 활성화에 기여