상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2023 주요성과 및 반성
□	2024 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 안심하고 마실수 있는 고품질 수돗물 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 방안 강구 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 자체 수돗물 목표 수질기준 강화 설정운영

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	상수도 현대화 사업을 통한 상수도 공급관망 개선 상수원 수질관리 강화 및 정수시설 유지보수와 운용 최적화 원격검침을 통한 정확한 요금관리로 행정의 신뢰성 확보

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

ㅎ

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	6	15	9	8	2
현 원	42	1	1	11	19	5	3	2
증 감				5	4	△4	△5

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 마을상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원					임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민 단체	기관
10	2	1	2	4	1	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	270,036	269,909	99.9
도심권	216,512	216,478	99.9
읍면권	53,524	53,431	99.8

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	152,828
생 활 용 수	소 계	195,300	133,306	100%
	광 역	105,300	81,308	61%
	자 체	90,000	51,998	39%
공 업 용 수	자 체	35,000	19,522

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,765	3,376,556	100.0
가 정 용	48,057	1,649,874	48.9
일 반 용	15,729	587,256	17.4
대 중 탕 용	38	15,055	0.4
산 업 용	839	532,522	15.8
전용공업용	102	591,849	17.5

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,951.7	2.5	25.3	1,200.3	723.6

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2023 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

▸노후상수도 정비사업

- 블록시스템 구축공사 및 우선 관망 정비공사 추진, 누수탐사 용역 추진

▸스마트 지방상수도 지원사업 : 시설공사 추진(2차분)

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

▸상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 5개소 3.2km/714개소

▸관내 변류(제수변 및 소화전) 정비 및 교체 : 161개소

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸수용가 옥내누수 탐사 1,021건

▸누수처 신고 포상금제 운영으로 신속 복구 : 61개소/655,000원

◦상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

▸급수구역 확장공사 : 4개소 4.0km / 급 □ 배수관 개선공사 : 371개소

◦상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

▸급수장치 수선 공사 1,248건

▸상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 42개소 9.0km

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

▸2023년 부과/징수 : 25,827백만원/25,632백만원(징수율 99.2%)

▸노후·동파·고장 수도계량기 교체 : 3,771전

◦ 수도요금 감면 실시로 경기 침체에 따른 시민부담 해소

▸기초생활수급자 및 다자녀, 특별재난감면 등 : 428,637건, 749백만원

□ 반      성

◦ 신흥정수장 차염설비 설치공사 추진 지연

▸차염설비 설치공사가 행정절차 지연 등으로 2024년 상반기 준공 예정임

		지방상수도현대화사업 <노후상수도정비, 스마트 관망관리 구축> 유수율 제고사업 금마배수지 확충 공사 급수구역 확장 및 급·배수관 개선공사 상수도요금 부과ㆍ징수 안전하고 효율적인 정수처리 시설물관리 맑은 물 생산 정수시설물 개선공사 정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

2024 주요업무계획

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 관망관리 구축>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 총사업비 : 66,493백만원

▸노후상수도 정비사업 : 60,586백만원(국 50%, 도 10%, 시 40%)

- 2024년 예산 : 8,333백만원(국비 6,504, 도비 1,301, 시비 528)

※ 2023년 10,450, 2022년 14,034, 2021년 12,080, 2020년 8,360

▸스마트 관망관리 인프라 구축 : 5,907백만원(국비 70%, 시비 30%)

- 2023년 이월사업비 : 2,074백만원(환경부 변경승인 2023. 11. 28.)

◦ 사업내용

▸노후상수도 정비사업

- 노후관교체(L=70.9km) 및 블록시스템구축(53개소) 등

▸스마트 관망관리 인프라 구축

- 정밀여과장치, 자동수질 측정장치, 소규모유량수압 감시 등

□ 추 진 계 획

◦ 노후상수도 정비사업

▸블록시스템 구축공사 완료                         : 2023. 3. ~ 2024. 12.

- 신흥급수구역 14개소 소블록 완료 및 운영(2023. 10.)

- 잔여 블록 39개소 구축 추진 중 : 팔봉 16, 금강 5, 왕궁 1, 금마 11, 광역 6

▸관망 정비공사(노후관 교체) 완료              : 2023. 6. ~ 2024. 12.

- 신흥 급수구역 내 노후관 교체(L=70.9km, 사업비 223억원)

- 우선 사업대상지(중앙동 일원 14km) 착공(2023. 7. ~ 2024. 7.)

▸스마트관망관리 인프라구축사업 준공          : 2024. 5.

- 정밀여과장치(10개소), 자동드레인(10개소), 소규모유량수압감시(42개소)

□ 기 대 효 과

◦ 노후 상수관망 현대화 시설 구축으로 유수율 제고 및 맑은 물 공급

2		유수율 제고사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

◦ 사 업 비 : 2,020백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	2,020
상수도관망 최적화사업	700	노후관 교체 및 GIS DB구축 L=5.1km
변류(제수변, 소화전 등) 정비공사	200	변류 200개소 보수 및 정비
누수처 긴급 복구공사	1,100	누수처 880개소 보수
상수도 지하시설물 지반탐사 용역	20 (도 20%,시 80%)	500mm이상 상수관 매설 지역 지표투과레이더 탐사 L=10km

□ 추 진 계 획

◦ 상수도관망 최적화사업

▸실시설계 용역	: 2024. 1. ~ 2.

▸노후관 교체 등 공사 추진	: 2024. 3. ~ 8.

◦ 변류(제수변, 소화전 등) 정비공사 및 누수처 긴급 복구공사

▸긴급 민원 처리 및 복구작업	: 연   중

◦ 상수도 지하시설물 지반탐사 용역

▸지반탐사 용역 발주 및 착공	: 2024. 1. ~ 2.

▸지표투과레이더 탐사 및 중간 보고	: 2024. 3. ~ 5.

▸천공 및 내시경 정밀 조사 및 복구	: 2024. 6. ~ 8.

□ 기 대 효 과

◦ 수도시설 개량으로 깨끗하고 안전한 양질의 수돗물 공급

◦ 노후 시설물 정비로 시민 불편 해소 및 유수율 제고에 기여

◦ 상수도관 매설 지역에 대한 지반침하 등 안전사고 예방

3		금마배수지 확충 공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.(4개년)

◦ 총사업비 : 8,430백만원(균특 4,005, 시비 1,717, 원인자 2,708)

◦ 사업위치 : 금마면 서고도리 산 33-6번지 금마배수지 일원

◦ 사업내용 : 금마배수지 확충(V=5,000㎥ ⇒ V=15,000㎥)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2021	2022	2023	2024	비 고
합 계	8,430	714	1,086	1,420	5,210
균 특	4,005	500	760	1,000	1,745
시 비	1,717	214	326	420	757
원인자부담금	2,708				2,708

□ 추 진 실 적

◦ 1차분 착공 및 준공	: 2022. 10.~2023. 9.

▸기존 구조물 철거 및 1차분 폐기물 처리용역 준공

▸옹벽 및 배수지(1) 구조물 설치

◦ 2차분 착공 및 준공	: 2023. 9.~2023. 12.

▸배수지(2) 기초 CON’C 타설

□ 추 진 계 획

◦ 3차분 착공 및 준공	: 2024. 1.~2024. 12.

▸토목, 건축, 기계, 전기 잔여분 공사 추진

- 배수지(2) 구조물 설치, 기계(가압펌프) 및 전기공사 등

□ 기 대 효 과

◦ 북부권 용수 수요 증가에 따른 배수지 체류시간 확보 및 생활용수 안정공급

4		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

◦ 사 업 비 : 2,310백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업내용	위 치	비고
합 계	2,310
급수구역 확장공사	860	배수관부설 L=2,500m	여산면 성치마을등 2개소
상수도 부설도로 노면정비공사	400	25개소, 5.0km	익산시 일원
급·배수관 개선공사	1,050	525개소	익산시 일원

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장공사	: 2024. 1. ~ 11.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~11월)

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사	: 2024. 1. ~ 11.

▸현지조사 및 설계(1~2월) / 공사발주(3월) / 공사추진 및 준공(4~11월)

◦ 급․배수관 개선공사	: 2024. 1. ~ 12.

▸상수도 공급 관련 생활민원처리 및 급․배수관 확장개선(연중 수시)

□ 기 대 효 과

◦ 급 □ 배수관 신설 및 확장으로 수돗물 공급 최적화

◦ 상수도 부설 후 노면 불량 도로의 개선으로 안전사고 예방

5		상수도 요금 부과 ․ 징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 2024년도 부과․징수예정액 : 30,506백만원

(단위:백만원, 2023. 12. 기준)

합계(A+B)	현년도 부과예정액(A)	과년도 체납액(B)	비 고
30,506	29,820	686	2023년 체납액 : 195 2022년 이전 체납액 : 491

□ 추 진 계 획

◦ 정확한 사용량 부과·징수

▸고장‧노후 등 계량기 신속 교체 및 원격검침시스템 관리철저

▸검침업무 전문화를 위한 계량기 조사원 직무교육 실시(조사원 25명) : 월1회

◦ 체납액 발생 최소화

▸원격검침을 통한 사용량 과다증가 수용가 신속 확인‧안내

▸편리하고 다양한 납부방법 지속홍보 : 자동이체, 가상계좌, 신용카드 등

▸소멸시효 경과분 등에 대한 결손처분

◦ 고액‧상습체납자 관리강화

▸상수도 체납사용료 고액‧상습 체납자 징수반 편성․운영  : 2개반 8명

▸30만원 이상 체납자에 대한 강력한 체납 징수    : 정기(월1회)‧수시

- 재산 압류(부동산, 차량), 급수정지 등

□ 기 대 효 과

◦ 정확한 사용량 조사 및 요금 부과로 신뢰받는 상수 행정 구현

◦ 강력한 징수 활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

6		안전하고 효율적인 정수처리 시설물관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 538백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	538
배수지․침전지 및 여과지 등 환경정비	225	용역 12건 발주
정수시설물 건축․전기 및 기계설비 유지보수	180	시설물 20개소 보수
정수시설물(8개소) 정기안전점검 용역	31	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제 11조(안전점검의 실시)
정수시설물 정밀안전점검 용역(5개소)	52
정수시설물 정밀안전진단 용역(1개소)	50

□ 추 진 계 획

◦ 신흥정수장 외 7개소 배수지, 신흥 및 금강 침전지 및 여과지 등 환경정비

▸배수지(2회),침전지(4회) 및 여과지(2회) 청소 실시  : 2024. 2. ~ 11.

▸정수시설물 주변 풀깎기 실시(4회)	: 2024. 4. ~ 11.

◦ 정수시설물 건축․전기 및 기계설비 유지보수

▸정수처리시설 관련 유지보수 및 노후화 개선 등  : 연   중

◦ 정수시설물(8개소) 정기안전점검 용역(반기에 1회 이상 실시)

▸상반기(신흥정수장 외 7개소) 용역 추진 및 준공  : 2024. 2. ~  6.

▸하반기(금마가압장, 팔봉배수지) 용역추진 및 준공 : 2024. 7. ~ 11.

◦ 정수시설물 정밀안전점검 용역(2년에 1회 이상 실시)

▸신흥정수장 외 4개소 용역 추진 및 준공	: 2024. 3. ~ 11.

◦ 정수시설물 정밀안전진단 용역

▸신흥공업용수처리시설 용역 추진 및 준공	: 2024. 3. ~ 11.

□ 기 대 효 과

◦ 노후화된 정수시설의 정기적인 기능 진단을 통해 안전사고 미연 방지

◦ 시민이 안전하게 마실 수 있는 정수처리시설 효율적 운영관리

7		맑은 물 생산 정수시설물 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 2,265백만원(국비 603, 시비 1,662)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	2,265
온실가스 감축설비 지원사업	1,326	송수펌프 7대 교체
신흥정수장 차염주입설비 설치공사	809	차염탱크(20㎥×3기) 설치
신흥정수장 상황실 노후CCTV 교체공사	130	CCTV 15개소 등 교체

□ 추 진 계 획

◦ 온실가스 감축설비 지원사업

▸사업위치 : 신흥정수장(4대), 금강정수장(3대)

▸실시설계 용역 추진 및 준공	: 2024. 1. ~  4.

▸송수펌프 교체 등 공사 추진 및 준공	: 2024. 5. ~ 10.

◦ 신흥정수장 차염설비 설치공사

▸공사지연(이월예산)된 차염설비 및 추가분 차염저장탱크 일괄설치

- 차염탱크(20㎥×3기) 설치, 제어반 설치, 기존 염소설비 이설 및 철거 등

▸차염주입설비 설치공사 추진 및 준공	: 2024. 1. ~  6.

◦ 신흥정수장 상황실 노후 CCTV 교체공사

▸기존 15년이상 노후화된 CCTV 및 영상감시장치 교체

▸노후 CCTV 교체공사 추진 및 준공	: 2024. 2. ~  6.

□ 기 대 효 과

◦ 노후화된 송수펌프를 고효율 펌프로 교체하여 온실가스 배출량 감소

◦ 시설물을 개선․보수로 고품질 수돗물 안정적인 공급

8		정수장에서 가정까지 안전한 수질관리

□ 사 업 개 요

◦ 원․정수 목표 수질 지정을 통한 수질관리 및 검사 강화

◦ 수돗물에 대한 신뢰도 향상를 위한 주민 홍보 강화

□ 추 진 계 획

◦ 원․정수 목표 수질 : 원수 BOD 2mg/L이하, 정수 탁도 0.15 NTU이하

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정 수질검사 기준	자체 수질검사 계획
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 11개 분 기 : 질산성질소 등 42개 반 기 : 바이러스 등 4개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 월 간 : 수소이온농도 등 11개 분 기 : 질산성질소 등 42개 반 기 : 바이러스 등 4개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 62개 분 기 : 염화비닐 등 28개 반 기 : 마이크로시스틴-LR 6종 1개	일 2회 : 수소이온농도 등 7개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 62개 분 기 : 염화비닐 등 28개 반 기 : 마이크로시스틴-LR 6종 1개

◦ 관내 수도꼭지 수질검사 실시	: 매월 42개소(읍·면·동 인구비례)

◦ 신흥․금강정수장 노후 수질자동측정기 교체 실시    : 20,000천원(2대)

◦ 수질검사결과 홍보강화	: 홈페이지 및 관내 관공서 등

□ 기 대 효 과

◦ 원‧정수에 대한 철저한 수질관리로 시민이 안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보