2026. 1.

제275회 익산시의회(임시회)

2026 주요업무 계획

	국가식품클러스터담당관

국가식품클러스터담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2025 주요성과 및 반성
□	2026 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
국가식품클러스터, 첨단 식품산업 메카로 지원⸱육성

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	국가식품클러스터 확장 추진 푸드테크산업 발전 혁신 성장 견인 미래식품 산업 선도를 위한 국내외 앵커기업 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	푸드테크 산업 선도를 위한 혁신 기반 구축 전략업종 및 브랜드 가치 높은 기업 대상 투자유치 활동 기업 준공 가속화에 따른 맞춤형 기업지원 강화 식품과 문화․관광이 융합된 산업단지 조성 추진

일   반   현   황

□ 기     구

					국가식품클러스터담당관
푸드테크계						기업유치계						산단조성계

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12	1	3	4	2	2
현 원	12	1	4	3	1	3
증 감	0	0	1	△1	△1	1

□ 사 무 분 장

◦	푸드테크	:	국가식품클러스터 기획조정, 푸드테크 관련 사업 및 정책 추진, 국립익산식품박물관 추진, 공모사업 대응 및 국가예산 확보, 한국식품산업클러스터진흥원 운영 지원, 국가식품클러스터 기업협력 및 기술지원사업, 외국인 투자지역 관리․운영
◦	기업유치	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치, 산학연 교류 협력 지원, 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립, 국가식품클러스터 홍보
◦	산단조성	:	국가식품클러스터 2단계 조성, 식품전문산업단지 기반시설 확충 등 조성지원, 소스산업화센터 운영, 배후복합도시 조성, 식품문화복합 혁신센터 구축, 복합문화센터 운영

2025 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 국가식품클러스터 2단계 예비타당성 통과를 위한 투자유치 활동 적극 추진

▸식품 관련 기업 투자상담 및 식품유관기관·단체 방문 통한 투자수요 기업 발굴 : 416개사(누적)

◦ 농식품 분야 메타버스 기반 기술실증 지원사업

▸제조공정 관련 디지털 통합 플랫폼 구축, 식품 공정 데이터 수집 및 시뮬레이션 기술 개발 추진

◦ 국토부 신규 국가산단 후보지 선정에 따른 2단계 조성 추진(`23년~30년, 62.5만평)

▸실무협의체 및 관계기관 회의 11회(`25.2.~12.)

▸사업타당성조사 용역	: LH 시행

◦ 식품문화복합 혁신센터 구축 사업 추진(`24~`27년)

▸총사업비 : 423.21억(국 245.64, 도 43.13, 시 134.44) / 연면적 : 5,935㎡(지상3층, 지하1층)

- 부지용도변경(연구시설⟶지원시설, `25.7.), 설계 용역 중(`25.8.~)

◦ 푸드테크 연구지원센터 구축 사업 추진(‘24~‘26년)  * 부지매입비 별도

▸총사업비 : 10,500백만원(국 5,250, 도 1,575, 시 3,675) / 연면적 : 1,500㎡

- 매매계약 체결 및 토지소유권 이전(`25.7.) / 푸드테크 연구지원센터 착공(`25.9.)

◦ 맞춤형 투자유치 활동으로 분양계약 체결	: 10개사 47천㎡

▸소이미푸드(22천㎡),  포네이처스(5천㎡), 더벨세븐(3천㎡), 네이처진(3천㎡), 담꽃(3천㎡) 등

◦ 기업 비즈니스 지원 활성화

▸전문인력양성 : 총 844명 지원 / 벤처창업 활성화 지원 : 120팀 지원

▸마케팅 판매 지원 : 비즈니스플랫폼 운영 등

- 푸드비즈온 393개사, 온오프라인 푸드마켓 입점 판매 1,627품목

◦ 기업기술 지원 사업

▸기업 기술력 강화 지원 : 453개사 14,759건 / 인증 획득 및 운영 : 28개사 39건

◦ 국가식품클러스터 입주기업 지원사업 추진

▸통근버스 : 161,800천원(누적 54,923명 이용), 출퇴근 각 4회 운행

▸임 차 비 : 113,828천원(15개사/월평균 47개소, 49명/누적 인원 439명)

◦ `국립식품박물관 건립’ 우리동네(익산) 대선공약 선정	: 2025. 5.

◦ 2026년 신규 국가예산 확보	: 49억(국비)

▸국가식품클러스터 근로자 기숙사 건립(총사업비 196억)

□ 반      성

◦ 신규 국가산단 14개 후보지 추진에 따른 LH의 재정부담 및 추진일정

조정 등으로 예비타당성조사 지연

▸관계기관 협업하여 1단계 분양률 제고 및 기업수요 추가 확보를 전략

적으로 추진하여 예비타당성조사 조기 추진 노력

		국가식품클러스터 2단계 조성 농식품 분야 메타버스 기반 기술실증 지원 푸드테크 연구지원센터 구축 식품문화복합 혁신센터 구축 투자유치 활동 강화 중소기업 환경개선사업 (통근버스 운영) 기능성 원료은행 운영 입주기업 기숙사 임차비 지원사업 국가식품클러스터 복합문화센터 운영 국가식품클러스터 근로자기숙사 건립 국가식품클러스터 2단계 확대를 위한 푸드테크 육성 종합계획 수립

2026 주요업무계획

1		국가식품클러스터 2단계 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2023. ~ 2030.(8년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 동촌리, 발산리, 평장리, 흥암리 일원

◦ 사업규모 : 207만㎥(62.5만평)

◦ 총사업비 : 385,500백만원(공사비 162,200, 보상비 등 223,300)

◦ 사업내용 : 식품 제조·연관업종 등 관련 식품기업･연구소 입주를

위한 식품 전문 국가산업단지 조성

◦ 예비사업시행자 : 한국토지주택공사(60%), 전북개발공사(40%)

□ 추 진 계 획

◦ 경영투자심사(LH)	: ‘26. 3. ~ 6.

◦ 예비타당성 조사	: ‘26. 7. ~ 12.

◦ 산업단지계획 용역	: ‘27. 1. ~ 12.

◦ 산업단지계획 승인·고시	: ‘28. 1.

◦ 용지보상	: `28. 2. ~ 8.

◦ 공사추진	: `28. 8. ~ `30. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 1단계 식품산업단지와 시너지 효과 극대화로 식품산업의 경쟁력

제고와 세계 식품시장의 중심으로서 위상 강화

◦ 식품산업의 발전 견인과 사회적 가치 창출에 기여하여 세계적 규모의

식품기업 집적화 클러스터로 글로벌 경쟁력 확보

2		농식품 분야 메타버스 기반 기술실증 지원

□ 사 업 개 요

◦사업기간 : 2024. 6. ~ 2026. 12. ※ 2024~2028으로 사업 기간 연장 협의중

◦총사업비 : 29,500백만원(국 13,150, 도 3,945, 시 9,205, 민 3,200)

▸26년도 예산 : 6,279백만원(국 2,700, 도 810, 시 1,890, 민 879)

※ 25년 사업 평가에 따라 사업비 변경 가능성 있음

▸금회 1,200백만원 편성(잔여 사업비 약690백만원 `26년 추경 편성 예정)

◦수행기관

▸주관 수행기관 : (재)전북테크노파크(전북디지털융합센터-권역거점SW진흥기관)

▸참여 수행기관 : 한국식품산업클러스터진흥원, 한국전자통신연구원,

한국식품연구원, 국립식량과학원, 한국전자기술연구원,

전북농업기술원, 텔로스, MDS인텔리전스, 오케스트로

◦사업내용: 농식품 제조 전주기 데이터 표준화, 제조시설 표준 모델링, 메타버스 시뮬레이션 기술로 식품 제조공정의 최적화 지원,

K-소스․음료․대체육 제조공정 최적화 및 식품포장 적정성 등

□ 추 진 계 획

◦ 2026년 사업 협약 체결(전북도, 익산시, 전북테크노파크)  : `26. 1.

◦ 데이터 수집, 시뮬레이션 기술개발, 디지털 통합플랫폼 구축 등 고도화      : `26. 1. ~ 12.

◦ 푸드테크 응용서비스 실증 지원 및 기술 고도화           : `26. 1. ~ 12.

◦ 출연금(시비) 추경예산 확보                            : `26. 6.

◦ 월간회의 참여 및 추진 상황 점검                       : 수시

□ 기 대 효 과

◦ 제품의 연구·개발에서 사업화까지 농식품 제조 全과정에 대한 사전 시뮬

레이션 시스템을 지원하여 기회비용 절감 및 사업화 성공률 제고로 기업의 수익 증대를 견인하고 지역경제 활성화에 기여

3		푸드테크 연구지원센터 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 6. ~ 2026. 12.

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 광암리 1427-3

◦ 총사업비 : 10,500백만원(국 5,250, 도 1,575, 시 3,675) ※부지매입비 별도

▸2026년 사업비 : 7,626백만원(국 3,813, 도 1,143, 시 2,669.1)

- 금회 시비 1,700백만원 편성 (잔여 사업비 969.1백만원 `26년 추경 편성 예정)

◦ 규    모 : 부지 3,600㎡, 건물 연면적 1,500㎡

◦ 사업내용

▸(기업 입주공간) 사무실, 회의실 등 푸드테크 스타트업 창업공간 마련

▸(시설·장비) 기업이 공동 활용 가능한 연구·시험 장비 구축

▸(기술 실증) 교육·컨설팅 등을 통해 시제품 개발 및 기술 실증 지원

□ 추 진 계 획

◦ 푸드테크 연구지원센터 공사 추진 및 장비 구축	: `25. 10. ~ `26. 12.

▸건설공사 추진	: `25. 10. ~ `26.  8.

▸연구설비 설치 및 장비 입고	: `26.  6. ~ `26. 11.

▸시설물 인계 및 시험운전	: `26. 10. ~ `26. 12.

◦ 푸드테크 연구지원센터 준공	: `26. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 식물성 대체식품 원천기술 확보, 소재 개발, 실증 등 지원으로

푸드테크 산업의 저변을 넓혀주는 혁신 거점 마련

◦ 국산 콩을 활용한 식물성 대체식품 사업화, 상용화 확대로 기업의 수출 및

매출 확대를 견인하고, 이에 따른 농산물 수요 증가로 인한 농가소득 향상에 기여

4		식품문화복합 혁신센터 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 광암리 1458번지 외 3필지[지원시설(S7) 부지]

◦ 총사업비 : 42,321백만원(국 24,564, 도 4,313, 시 13,444)

▸건축비 등 35,941백만원(국 60%, 지방 40%), 운영비 3,000백만원(국 100%), 부지매입비 3,380백만원(시 100%)

▸2026년 사업비 : 3,893백만원(국 500, 도 100, 시 3,293)

- 금회 시비 3,060백만원 편성 (잔여 사업비 233백만원 `26년 추경 편성 예정)

◦ 규    모 : 부지면적 9,542.7㎡, 연면적 5,935㎡(지상 3층, 지하 1층)

◦ 사업내용 : 식품문화 체험공간 및 제품판매･홍보･교육･콘퍼런스 등

기업지원 공간 조성을 위한 식품문화복합혁신센터 구축

□ 추 진 계 획

◦ 매매계약 체결 및 토지소유권 이전(LH ↔ 익산시)	: ‘26. 1. ~ 3.

◦ 기본 및 실시설계 용역	: ‘26. 1. ~ 6.

◦ 공사 추진	: ‘26. 7. ~ ‘27. 12.

◦ 운영(한국식품산업클러스터진흥원)	: ‘28. 1. ~

□ 기 대 효 과

◦ 시민들이 찾아와 즐길 수 있도록 일반산업단지와 차별화된 전시·판매·

홍보, 체험학습 기능 등을 가미한 공간조성으로 산업단지 경쟁력 강화

5		투자유치 활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

◦ 총사업비 : 698백만원(국 349, 도 63, 시 146, 자 140)

◦ 사업내용 : 국내외 투자유치 활동(투자수요 발굴, 투자상담, 투자설명회, 홍보 등)

◦ 분양현황 : 129개사

[단위 : 천㎡(천평), %]

총면적	분 양		미분양		비고
	면 적	비 율	면 적	비율
1,367(414)	1,103(334)	80.7	264(80)	19.3	2025. 12. 31. 기준 (준공 88개사, 착공 13개사)

□ 추 진 계 획

◦ 투자유치 활동 및 홍보

▸국내외 식품기업 중 투자가능성을 고려한 전략적 투자유치 추진

▸기업 소통 강화 및 MOU 사후관리 등 투자 동향 상시 점검 추진

▸투자 관심기업 대상 현장 초청 중심의 1:1 밀착 상담 지원

▸국가식품클러스터의 인지도 고취를 위해 기업지원사업 등 성과사례 홍보

▸고질적 미분양부지(음료)에 대한 용도변경(식음료) 추진으로 투자유인 확대

◦ 투자수요 발굴

▸투자 유인효과 유발을 위해 관계기관과 연계한 맞춤형 투자설명회 운영

▸국가식품클러스터 홍보자료 제작을 통한 전략적 투자수요 발굴 추진

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 투자유치를 통한 인구증가, 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 기여

◦ 푸드테크 등 미래 식품산업 선도 통한 식품 산업 국가경쟁력 강화

6		중소기업 환경개선사업 (통근버스 운영)

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

◦ 총사업비 : 162백만원(도 49, 시 113)

◦ 사업내용 : 전세버스 임차계약 후 출퇴근 시간 통근버스 운행 지원

▸운행방법 : 45인승 4대 / 출퇴근 각 4회 / 월~금 운행

▸운행노선 : 원광대학교병원 → 익산 보건소 → 홈플러스 사거리 → 전자랜드 사거리 → 포레나 사거리 → 부송우남아파트 → 팔봉기안아파트 → 국가식품클러스터(순환)   * 퇴근은 역순

□ 추 진 계 획

◦ 상반기 전세버스 임차 용역 계약 추진	: `25. 12. ~

▸계약금액 : 71.5백만원 / ㈜동양해외관광

◦ 상반기 통근버스 운행	: `26. 1. ~ 6.

◦ 상반기 통근버스 만족도 조사 및 하반기 수요조사	: `26. 6.

◦ 하반기 전세버스 임차 용역 계약 추진	: `26. 6.

◦ 하반기 통근버스 운행	: `26. 7. ~ 12.

◦ 하반기 통근버스 만족도 조사 및 차년도 수요조사	: `26. 12.

* 상‧하반기 2회 계약 추진으로 근로자 수요에 따른 운행 편수 등 탄력 조정

□ 기 대 효 과

◦ 근로환경 개선을 통한 입주기업 고용 안정화 및 산업단지 활성화

7		기능성원료은행 운영지원

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

◦ 총사업비 : 500백만원(시비)

▸인건비 238백만원, 운영비 262백만원

◦ 지원대상 : 한국식품산업클러스터진흥원(기능성원료은행)

◦ 사업내용 : 기능성원료은행 운영비 지원

▸(원료개발) 신규 기능성 원료 발굴 및 기능성 규명

▸(원료표준화) 기능성원료 표준화를 위한 제조공정 확립 및 생산

▸(보관/분양) 표준화된 원료(또는 기능성 성분) 보관 및 공급

□ 추 진 계 획

◦ 기능성원료 소재 선정 30건 추진	: `26. 1. ~ 2.

◦ 기능성원료 표준화 및 비축 20건 추진	: `26. 3. ~ 12.

◦ 기능성 농식품자원 실태조사 추진	: `26. 1. ~ 12.

▸시장분석 및 소비자조사 등 기능성표시식품산업 통계체계 구축

◦ 식품기업 기능성원료 분양 및 기술이전 추진	: `26. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 기능성원료은행 운영 안정화에 따른 지역의 기능석식품산업 육성 기반 마련

8		입주기업 기숙사 임차비 지원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

◦ 총사업비 : 150백만원(시 120, 자 30)

◦ 사업대상 : 국가식품클러스터 산업단지 내 공장 가동 중인 입주 및 벤처기업

◦ 사업내용 : 국가식품클러스터 산업단지 입주기업이 관내 공동주택을

임차하여 근로자에게 기숙사로 제공하는 경우 기숙사

1개소당 임차료(월세) 80% 지원(월 최대 30만원)

□ 추 진 계 획

◦ 공고⸱접수 및 참여기업 심사⸱선정	: `26. 1.

◦ 협약체결(익산시 ↔ 참여기업)	: `26. 2.

◦ 보조금 교부신청 접수 및 지급	: `26. 2. ~ 12.

◦ `27년도 지원사업 희망기업 수요조사	: `26. 8.

◦ 사업 정산	: `26. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 근로자의 정주 여건 개선으로 장기 재직 유도 및 고용

안정성 확보를 통한 국가식품클러스터 활성화 촉진

◦ 타지역 인구 유입 유도 및 인접 시군으로의 전출 방지를 통해 우리시

전입 확대와 인구 증가 도모

9		국가식품클러스터 복합문화센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

◦ 총사업비 : 163백만원(시비)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426-1번지

◦ 규    모 : 부지 2,271㎡(687평), 연면적 1,118.13㎡(338평)

▸ 주요시설 : 식당, 체력단련실, 전시홍보관, 라이브방송실

◦ 사업내용

▸ 시설 관리·운영 및 계획 수립, 유지보수, 사무보조, 청소 등

▸ 식당 등 일부 시설의 이용료 징수 및 사용

▸ 사회공헌 활동, 커뮤니티 활성화 등 사회참여 지원을 위한 사업

▸ 그 밖에 익산시장이 지역주민 및 근로자를 위해 필요하다고 인정하는 사업 등

□ 추 진 계 획

◦ 복합문화센터 민간위탁 운영	: `26. 1. ~ 12.

▸ 위 탁 자 : 사단법인 국가식품클러스터 입주기업협의회

▸ 위탁기간 : `24. 10. 1. ~ `26. 12. 31.

◦ 복합문화센터 민간위탁(재계약) 추진	: ‘26. 5. ~ 9.

▸ 복합문화센터 민간위탁(재계약) 추진계획 수립	: ‘26. 5.

▸ 복합문화센터 민간위탁 성과평가	: ‘26. 5.

▸ 민간위탁 심의위원회(재계약 적정여부 심의)	: ‘26. 6.

▸ 복합문화센터 민간위탁 의회 동의	: ‘26. 7.

▸ 복합문화센터 민간위탁(재계약) 협약 체결	: ‘26. 9.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 입주기업 및 종사자 정주여건 향상

◦ 국가식품클러스터 복지환경 개선으로 기업유치 촉진 및 지역경제활성화 도모

10		국가식품클러스터 근로자 기숙사 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2029. 12.

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 지원시설용지 내

◦ 총사업비 : 19,600백만원(국 4,900, 도 4,410, 시 10,290)

▸ 2026년 사업비 : 1,024백만원(국 256, 도 230.4, 시 537.6)

* (설계비) 1,024 (건축비) 15,976 (부지매입비) 2,600

- 금회 시비 `26년 추경 편성 예정

◦ 규    모 : 연면적 3,343㎡(1,011평), 부지면적 3,306㎡(1,000평)

* (1층) 생활편의시설(편의점, 카페 등), (2~4층) 기숙사 100호

◦ 사업내용 : 국가식품클러스터 내 근로자들을 위한 주거공간 확보

□ 추 진 계 획

◦ 건축기획용역	: ‘26. 1. ~

◦ 공유재산심의 및 공유재산관리계획(의회)	: `26. 3.

◦ 지방투자심사	: ‘26. 5.

◦ 시비 추경예산 편성	: ‘26. 6.

◦ 설계공모 및 설계용역	: ‘26. 7. ~ `27. 4.

◦ 건축허가	: `27. 4.

◦ 공사시행	: `27. 6. ~ `29. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 입주기업의 우수인력 확보를 도모하고 근로자들을

위한 공동 주거공간 제공

11		국가식품클러스터 2단계 확대를 위한 푸드테크 육성 종합계획 수립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

◦ 총사업비 : 150백만원(도 100, 시 50)

※각 기관별 직접교부

◦ 운영기관 : 전북바이오융합산업진흥원

◦ 사업내용 : 식품산업 및 푸드테크 산업 현황 파악, 기존 인프라 및 지역

연계 방안, 2단계 산단 활성화 방안 마련, 정부 정책 연계 후속

사업 계획  및 푸드테크 산업 육성 종합계획 수립

□ 추 진 계 획

◦ 세부사업계획 수립                                     : `26. 1.

◦ 사업추진 업무협약(시‧바이오진흥원) 체결                 : `26. 1.

◦ 업무협약 시의회 보고                                   : `26. 1.

◦ 사업 추진상황 보고회	: `26. 3. ~ 9.

▸ 착수(26. 3.), 중간(26. 6.), 최종(26. 9.)

◦ 푸드테크 육성 종합계획 수립 사업추진                    : `26. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 식품산업 분석을 통한 국가식품클러스터 2단계(푸드테크 산단) 활성화

방안 마련

◦ 데이터 기반의 식품산업 및 푸드테크 중장기 발전 전략 체계화

◦ 신규 국가예산 사업 발굴 및 관련 후속사업 계획 수립