2026. 1.

제275회 익산시의회(임시회)

2026 주요업무 계획

	건 설 국

건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2025 주요성과 및 반성
□	2026 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경 하천조성 및 안전한 도로 건설

		전 략 목 표
◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공
◦	도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충
◦	환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공

		중 점 과 제
◦	공익사업을 위한 적극 협의보상과 도로망 확충으로 도시발전 기여
◦	도로 확포장으로 지역 간 소통원활 및 통행불편 해소
◦	시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진
◦	생태하천 정비로 생활환경개선 및 주민편익 도모

일   반   현   황

□ 기        구

					건설과
도로시설			도로기반					하천시설				하천관리

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18		1	4	7	2	4
현 원	22 (정원외 1)		1	4	4 (정원외 1)	6	7
증 감	4		-	-	△3	4	3

□ 사 무 분 장

	◦	도로시설계	:	시도 및 농어촌도로 확·포장사업, 철도건널목개량사업, 건설사업 편입토지 보상 및 수용재결, 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반, 고속국도, 국도, 지방도 등 업무지원
	◦	도로기반계		소규모주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비공사, 비법정도로 확포장공사 등
	◦	하천시설계	:	하천기본계획수립, 지방하천 정비사업, 소하천 정비사업
	◦	하천관리계	:	하천유지관리(국가,지방,소하천), 용안생태습지유지관리 만경강 친수시설 유지관리, 하천점용허가 및 골재채취허가

□ 도 로 현 황

구 분	계	시 도	농어촌도로
노 선 수	1,551	1,264	287.0
연장(km)	1,091.6	511.6	580.0
확포장(km)	959.3	415.4	543.9
포장률(%)	87.9	81.2	93.8

□ 하 천 현 황

(단위 : km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비 대상	개수 연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	333.493	85	323.863	333.493	167.59	165.903	50.3%
국가하천	3	42.19	3	42.19	42.19	42.19	-	100%
지방하천	27	189.1	20	179.47	189.1	95.46	93.64	50.5%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	29.94	72.263	29.3%

□ 하천점용허가 현황

필 지 수				면 적(㎡)
계	농업용	대지	공공용 기타	계	농업용	대지	공공용 기타
1,555	355	-	1,200	418,722	189,294	-	229,428

□ 차량보유 현황

하천관리차량

94버6749 전기1톤트럭 1대, 오토바이 1대

2025 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 시군도, 농어촌도로 확포장을 통한 도농균형발전 및 주민편익 증대(8건)(용역 완료 2건)

▸함라 천남길 도로확포장 공사 실시설계 용역 완료	: 2025. 4. 14.

▸국립 익산 치유의 숲 진입도로 확포장 공사 실시설계 용역 완료       : 2025. 5. 16.

(공사 착공 3건)

▸어양 어곳~부평간 도로확포장공사(2공구) 착공(L=0.4km, B=8.0m)	: 2025. 4. 29.

▸낭산 호암~석천간 위험도로 구조개선사업 착공(L=0.2km, B=8.0m)	: 2025. 4. 29.

▸낭산 장암사거리 회전교차로 설치공사 1차분 착공	: 2025. 5. 7.

(공사 준공 3건)

▸성당 삼회선 도로구조개선사업(회전교차로) 준공	: 2025. 6. 27.

▸금마 갈산~서편간 도로확포장공사(L=1.6km, B=8.0m) 준공	: 2025. 7. 9.

▸낭산 호암~석천간 위험도로 구조개선사업(L=0.2km, 가각정비) 준공   : 2025. 11. 20.

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

▸소규모 주민숙원사업, 마을안길 노후도로정비 등 민원 처리  : 222건

◦ 하천 정비사업을 통한 재해예방 및 영농편의 도모

▸동면천 지방하천 정비사업(전체분) 준공	: 2025. 6.

◦ 관내 국가하천(2개소), 지방하천(27개소) 및 소하천(62개소) 유지관리를 통해       안전하고 쾌적한 하천환경 조성 기여

▸국가하천 : 금강 용안생태습지 제방 보수공사 외 8건

▸지방하천 : 하천 준설 7건, 풀깎기 10건 등

▸소 하 천 : 하천 준설 7건, 제방 및 시설보수 12건, 풀깎기 2건 등

□ 반      성

◦ 주민숙원사업 구간에서 토지소유자 협의 지연 및 현장 여건 변경으로 사업 추진       일정이 지연된 경우가 있었음

▸사전 행정절차를 철저히 검토하고, 토지사용권원 확보를 위하여 토지 소유자  대상 안내 및 협의를 적극적으로 추진하여 원활한 사업 시행에 노력하겠음

		시도 및 농어촌도로 확포장
		서수~평장간 국도대체우회도로 개설
		생활여건개선을 위한 주민숙원사업
		지방하천 정비사업
		산북천 개선복구사업
		자연재해위험개선지구 정비사업
		외두소하천 정비사업
		만경강 친수시설 유지관리
		금강 용안생태습지 유지관리
		하천제방 유지관리

2026 주요업무계획

1		시도 및 농어촌도로 확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 관내 농어촌지역 9개 읍면동

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2028. 12.

◦ 사업규모 : 11개사업 L=4.72km, B=8.0~24.0m

(공사추진 5개노선, 토지보상 3개노선, 실시설계 3개노선)

◦ 총사업비 : 12,279백만원

(단위: 백만원)

총사업비	기 투 자	2026년	2027년 이후	비 고
12,279	4,240	3,880	4,159	본예산 : 1,630 명 시 : 2,121 사 고 : 129

□ 추 진 계 획

◦ 공사 5개노선 추진	: 2026. 1. ~ 12.

▸회전교차로 2개소(두여삼거리, 장암사거리)

▸시도 1개소(어양 어곳~부평간 확포장)

▸도로확포장 2개소(지방도 720호선 연결도로 확포장, 춘포 오룡선)

◦ 토지보상 3개노선 추진(수용재결 병행)	: 2026. 1. ~ 12.

▸농어촌도로 3개노선(함라 행진선, 황등 상동선, 왕궁 금오동~군도22호)

◦ 실시설계 3개노선 추진	: 2026. 1. ~ 12.

▸농어촌도로 3개노선(낭산 호암~석천, 하나로~소간촌, 성당 수산마을 교행차로)

□ 기 대 효 과

◦ 농어촌지역 주민의 교통편익과 농수산물의 생산·유통성을 향상시켜 지역경제 활성화 기여

2026년도 노선별 추진 계획

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2028. 12.

◦ 사업개요 : 도로확포장 L=4.72km, B=5.0~24.0m

(공사추진 5개노선, 토지보상 3개노선, 실시설계 3개노선)

◦ 총사업비 : 11개사업 / 12,279백만원 (2026년 예산 3,880)

◦ 노선별 추진상황

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	26년 예산액 (이월예산포함)	27년 이후
계	11개 사업			L=4.72km B=5.0~24.0m	12,279	4,240	3,880	4,159
공사 (5)	지 방 도 (1)	지방도 799호	여산 두여삼거리 회전교차로	회전교차로 1식	400	181	219	-	공정률90% 명 시219 공사비219
	시 도 (1)	1268호	어양 어곳~부평간 도로확포장(2공구)	L=0.40km B=8.0m	2,330	1,761	569	-	공정률90%본예산280 명 시289 공사비289 국유지 매입비130 통신선 이설 150
	농 어 촌 도 로 (3)	왕궁 307호 (시대선)	지방도 720호선 연결도로 확포장공사	L=0.10km B=24.0m 회전교차로설치 1식	1,390	239	1,151	-	공정률30% 본예산350 명 시801 공사비1,151
		춘포 102호 (오룡선)	춘포오룡선 도로확포장	L=0.70km B=8.0m	1,500	818	397	285	공정률50% 본예산200 명 시197 공사비200 토지수용비197
		낭산 102호 (남천선)	낭산 장암사거리 회전교차로	회전교차로 1식	450	174	276	-	공정률90% 명 시276 공사비276
보상 (3)	농 어 촌 도 로 (3)	왕궁 102호 (농장선)	왕궁 금오동~군도22호간 도로확포장	L=0.55km B=8.0m	1,000	485	129	386	공정률40% 사 고129 토지수용비129
		함라 312호 (행진선)	함라 행진선 도로확포장	L=1.43km B=8.0m	2,070	370	300	1,400	공정률63% 본예산300 보상비300
		황등 212호 (상동선)	상동선(황등하동~동연지하차도) 도로확포장 (2공구)	L=0.3km B=8.0m	800	120	250	430	공정률40% 보상률67% 본예산250 보상비250

구 분	도로 등급	노 선 명	사 업 명	사업개요	소요예산액 (백만원)				비 고
					총사업비	기투자	26년 예산액 (이월예산포함)	27년 이후
실 시 설 계 (3)	농 어 촌 도 로 (3)	낭산 104호 (북성선)	낭산 호암~석천간 위험도로구조개선	L=0.20km B=8.0m	300	82	218	-	명 시218 용역비18 공사비200 전북특별자치도 협의하여 신규사업지 발굴필요
		삼기 203호 (석라선)	하나로~소간촌간 도로확포장(2공구)	L=1.00km B=8.0m	2,000	10	332	1,658	1공구완공 (L=0.6km) 전체 공정률45% 2공구 실시설계 (L=1.0km) 본예산250 명 시82 보상비322 용역비10
		성당 201호 (외부선)	성당면 수산마을 교행차로 설치공사	L=40m B=5.0m	39	-	39	-	명 시39 용역비4 공사비35

2		서수~평장간 국도대체우회도로 개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 신기리 ~ 금마면 동고도리

▸1공구 : 황등면 신기리, 황등리, 삼기면 용연리, 월성동, 임상동 일원

▸2공구 : 삼기면 용연리, 금마면 갈산리, 용순리, 서고도리, 동고도리, 덕기동 일원

◦ 사업기간 : 2021. ~ 2028.

◦ 사업규모 : 도로개설 L=14.19km, B=21.0m (4차선)

◦ 총사업비 : 3,245억원(국3,075 시170)

(단위 : 억원)

구분	총사업비	기 투 자	2026년	2027년 이후	비 고
계	3,245	1,851	460.23	933.77
국비	3,075	1,697	444.23	933.77
시비	170	154	16	-	명시이월: 16억원

※ 1공구 88억, 2공구 82억

◦ 시 행 자 : 익산지방국토관리청 (익산시→동지역 토지보상)

▸공사 공정률 : 1공구(28%), 2공구(46%)

▸토지 보상률 : 1공구(70%), 2공구(100%)

□ 추 진 계 획

◦ 미협의 토지 수용재결(1공구 6차)에 따른 보상금 공탁	: 2026. 1. ~ 7.

◦ 잔여 영농보상 및 분묘이장 시행(1, 2공구 누락분)	: 2026. 1. ~12.

□ 기 대 효 과

◦ 국도대체우회도로개설에 따른 교통정체 및 혼잡구간 해소 및 도심 지역 원활한 교통 소통 도모

◦ 호남고속도로와 서해안 고속도로 연결로 지역 균형발전 및 간선도로망 확충으로 광역 교통물류 체계 구축

3		생활여건개선을 위한 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

사 업 명	사 업 량(건)			사 업 비(백만원)			비고
	계	본예산	이월	계	본예산	이월
합 계	200	137	64	3,853	1,878	1,975
소규모주민숙원사업	66	58	8	674	426	248	명시:248
마을안길노후도로정비	121	69	52	2,993	1,323	1,670	명시:1,550 사고:120
지역밀착형참여사업	9	9	0	129	129	0
교통사고 잦은곳 개선사업	4	0	4	57	0	57	명시:56 사고:1

◦ 사업대상

□ 추 진 계 획

◦ 사업대상지 현지 조사 및 설계 추진	: 2026. 1. ~  6.

◦ 관련기관 협의 등 행정절차 이행	: 2026. 1. ~  6.

▸토지사용승낙 등

◦ 공사(용역) 발주 및 준공	: 2026. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 지역주민 참여로 선정된 마을안길 생활여건개선 사업의 추진으로 주민참여예산 활성화 및 주민생활 불편 해소

◦ 마을안길 노후도로 포장에 따른 안전사고 예방 및 주민생활편익 증진 기여로 주민 삶의 질 개선 기대

4		지방하천 정비사업

□ 사 업 개 요

사 업 명 (하천명)	사업개요			소요예산액(백만원)				비 고
	위치	기간	내용	총 사업비	기투자	26년 예산액 (이월예산포함)	27년 이후
계				122,025	1,048	9,156	111,821
익산천 (창평지구)	금마면 신용리 255-2 ~ 춘포면 창평리 937-9번지	24.1. ~ 28.12.	하천정비 L=6.5km 교량 재가설 15개소	44,335 도 31,937 시 12,398	131	3,269	40,935	- 본예산 2,100 - 계속비 1,169
탑천 (월하지구)	석왕동 306-2 ~ 신용동 1106-1번지	24.1. ~ 30.12.	하천정비 L=5.6km 교량 재가설 9개소	77,690 도 54,383 시 23,307	917	5,887	70,886	- 본예산 3,500 - 계속비 2,387

※ 익산천(900백만원), 탑천(1,500백만원) 시비 매칭 예산 미편성. (2026년 제1회 추경 편성 예정)

※ 미매칭시 다음년도 도 예산 패널티 발생 우려

□ 추 진 계 획

◦ 익산천(창평지구) 지방하천 정비사업 계약심의 의뢰	: 2026.  1.

◦ 익산천, 탑천 지방하천 정비사업 편입토지 보상 추진	: 2026.  2. ~ 2030. 12.

◦ 익산천, 탑천 지방하천 정비사업 통합 건설사업관리용역 착수 : 2026.  3. ~ 2030. 12.

◦ 탑천(월하지구) 지방하천 정비사업 공사 착공 및 준공	: 2026.  4. ~ 2030. 12.

◦익산천(창평지구) 지방하천 정비사업 공사 착공 및 준공	: 2026.  5. ~ 2028. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로

정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전 예방

5		산북천 개선복구사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 지방하천 산북천(죽청천 합류점~외돈교 상류지점)

◦ 사업기간 : 2024. 9. ~ 2026. 12.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=2.5㎞

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=5.8km, 교량 6개소 등

◦ 총사업비 : 33,490백만원(국 32,166 도 662 시 662)

▸세부내역 : (개선복구) 32,624백만원 / (기능복원) 866백만원

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2026년도 (이월예산포함)	2027년도 이후	비 고
33,490	17,626	15,502	-	- 본예산 300 - 명시이월 15,202

※ 산북천 개선복구(362백만원) 시비 매칭 예산 미편성(2026년 제1회 추경 편성 예정)

□ 추 진 계 획

◦ 산북천 개선복구공사 편입토지 보상 추진	: 2025.  1. ~ 2026. 12.

▸사유지 278필지 중 175필지 협의보상 완료 (보상률 63%)

◦ 산북천 개선복구공사 추진 (공정률 80%)	: 2025.  4. ~ 2026. 우기철 전까지

▸하천정비 및 교량 재가설 등 주요 공정 등

◦ 산북천 개선복구공사 준공           : 2026. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 수해 피해 발생에 따른 신속한 개선복구사업 추진으로 피해 발생의 원인을 근원적으로 해소하고 재발 방지 및 주민의 재산 피해 보호

6		자연재해위험개선지구 정비사업

□ 사 업 개 요

사 업 명 (지구명)	사업개요			소요예산액(백만원)				비 고
	위치	기간	내용	총 사업비	기투자	26년 예산액 (이월예산포함)	27년 이후
계				177,321	3,491	7,921	165,909
대조천	용동면 용성리 520 ~ 대조리 1218-3	25.1. ~ 29.12.	하천정비 L=4.25km 펌프장(Q=2,040㎥/분) 1개소 교량재가설 17개소	53,500 국 26,750 도 10,700 시 16,050	2,221	1,499	49,780	- 본예산 1,120 - 계속비 379
연화천	황등면 죽촌리 1128-1 ~함라면 다망리 84-8	24.1. ~ 28.12.	하천정비 L=2.73km 교량 재가설 11개소	19,826 국 9,913 도 3,965 시 5,948	1,270	1,822	16,734	- 본예산 700 - 계속비 1,122
연동지구	성당면 부곡리 45-1 일원	26.1. ~ 29.12.	배수펌프장 1개소 신설(6,060㎥/분)	55,000 국 27,500 도 11,000 시 16,500	-	2,400	52,600
함라지구 (풍수해)	함라면 함열리 123-4일원	26.1. ~ 30.12.	하천 정비 2개소 1.486km(교동천,수동천), 급경사지 정비 1개소, 우수관로 저류지 1개소(A=16,500㎡, V=82,500㎥) 등	48,995 국 24,498 도 9,799 시 14,698	-	2,200	46,795

※ 대조천(480백만원), 연화천(300백만원) 시비 매칭 예산 미편성. (2026년 제1회 추경 편성 예정)

□ 추 진 계 획

◦ 대조천 자연재해위험개선지구 실시설계용역 추진	: 2024.  8. ~ 2026. 6.

▸공법선정, 사전설계심의 등

◦ 연화소하천 자연재해위험개선지구 실시설계용역 추진	: 2024.  9. ~ 2026. 6.

▸마포농수로 관리기관인 한국농어촌공사 협의 등

◦ 연동지구 자연재해위험개선지구 실시설계용역 추진	: 2026.  1. ~ 2027. 6.

▸주민설명회, 관계기관 협의, 행정절차 이행, 지반조사 등

◦ 함라지구 풍수해 생활권 종합정비사업 실시설계용역 추진	: 2026.  3. ~ 2027. 6.

▸주민설명회, 관계기관 협의, 행정절차 이행, 지반조사 등

◦ 대조천 자연재해위험개선지구 공사 발주 및 준공	: 2026. 6. ~ 2029. 12.

◦ 연화소하천 자연재해위험개선지구 공사 발주 및 준공	: 2026. 6. ~ 2028. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우시 지속적인 침수피해 발생이 우려됨에 따라 하천 자연재해위험개선지구 정비를 통해 주민의 재산 및 인명 피해 보호

7		외두소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 성당면 두동리 1145(외두제) ~ 성당면 두동리 1175번지(두동천 합류점)

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 11.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=1.002km

◦ 사업내용 : 축제 및 보축 L=1.93km, 교량 신설 1개소, 재가설 3개소 등

◦ 총사업비 : 5,129백만원(설계 200, 보상 340, 공사 4,469)

(단위 : 백만원)

총 사업비	기 투 자	2026년도 (이월예산포함)	2027년도 이후	비 고
5,129	1,184	3,078	-	- 본예산 852 - 명시이월 2,215 - 사고이월 11

※ 2026년도 사업비(867백만원) 시비 예산 미편성(2026년 제1회 추경 편성 예정)

□ 추 진 계 획

◦ 외두소하천 편입토지 보상 추진	: 2025.  9. ~ 2026. 11.

▸사유지 26필지 중 20필지 협의보상 완료 (보상률 77%)

◦ 외두소하천 정비공사 추진 (공정률 70%)	: 2025. 11. ~ 2026.  6.

▸표토 제거, 축제 성토, U형 측구철거, 교량 재가설 및 가도설치 등

◦ 외두소하천 정비공사 준공	: 2026.  11.

□ 기 대 효 과

◦ 통수단면 부족 및 미개수된 노후 하천제방과 호안을 체계적으로 정비하여 주변 지역 주택 및 농경지 침수 등 자연재해 사전예방

8		만경강 친수시설 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 만경강 L=18km (오산면 ~ 춘포면)

◦ 위    치 : 6개지구(신지, 목천, 춘포, 화전, 반월, 마산)

◦ 주요시설

▸자전거도로(21.71km), 축구장, 야구장, 족구장, 농구장, 인라인장 등

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 친수시설관리, 제방도로 및 자전거도로 제초, 시설물보수 등

◦ 총사업비 : 576백만원 (국비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 만경강 친수시설 유지관리, 환경정비사업 추진	: 연중

◦ 만경강 제방 소파 보수	: 2026. 3.~10.

◦ 친수시설(모정, 운동시설, 산책로 시설물 등) 보수·보강	: 2026. 4.~11.

◦ 만경강 제방, 산책로, 자전거도로 제초(연2회)	: 2026. 5.~10.

□ 기 대 효 과

◦ 친수시설 유지보수를 통하여 안전하고 쾌적한 하천환경 조성 기여

9		금강 용안생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국가하천 금강 용안생태습지 670,000㎡ (20만평)

◦ 주요시설 : 축구장 1면, 족구장 2면, 주차장, 산책로, 화장실 2개소,
관찰데크 및 생태습지 6개소 등

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

◦ 사업내용 : 주차장 등 편의시설 정비, 친수공간 제초 및 예초, 노후시설물 보수 등

◦ 총사업비 : 272백만원 (국비 100%)

□ 추 진 계 획

◦ 금강 용안생태습지 시설물 유지관리, 환경정비사업	추진	: 연 중

◦ 편의시설 및 조경시설 보수·보강	: 2026. 4. ~ 11.

◦ 금강 용안생태습지 산책로 및 자전거도로 제초(연2회)	: 2026. 5. ~ 10.

◦ 하천시설물	7개소 정기안전점검	: 상·하반기

▸제방 : 강경우안제 외 2개소(강경천)

▸수문 및 통문 : 무형우안제 #1배수통문 외 3개소(강경천)

□ 기 대 효 과

◦ 용안생태습지 기반시설 및 편의시설 기능을 보강하여 관광 활성화에 기여

10		하천제방 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 지방하천 27개소 189.1km, 소하천 62개소 102.2km

◦ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

▸하천준설 및 정비 : 어량천 하천준설공사 외 5건, 익산천 제방 포장 및 정비, 민원처리 등

▸제초 및 예초 : 제방 제초작업 및 수목제거 등

▸안전점검 : 하천시설물 22개소 정기안전점검(상반기·하반기 실시)

▸지방하천 및 소하천 환경정비사업

◦ 총사업비 : 2,000백만원(도 577 시 1,423)

□ 추 진 계 획

◦ 지방하천 및 소하천 유지관리, 환경정비사업	: 연중

◦ 하천준설, 제방포장 및 정비	: 2026. 2. ~ 11.

◦ 하천 내 배수 시설물(31개소) 실시설계용역 및 보수	: 2026. 2. ~ 6.

◦ 제방 및 호안 제초·예초(연2회)	: 2026. 5. ~ 10.

◦ 하천시설물 15개소 정기안전점검	: 상반기 / 하반기

▸제방 : 만경강 목천지구 외 1개소(만경강)

▸수문 및 통문 : 여산면 원수우안1지구 외 12개소(강경천 7, 왕궁천 6)

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우 등 자연재해시 하천으로 인한 피해를 사전에 예방하고 이를 통하여 안전한 하천시설 및 쾌적한 하천환경 조성 기여